건축설계공모 지침서

[(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모]

2025.  4.

목        차

I. 개요	1

1. 설계공모의 배경 및 목적	1

2. 사업개요	1

II. 설계공모 운영 일반지침	3

1. 설계공모 방법: 일반 설계공모(전국공모)	3

2. 설계공모 응모 자격	3

3. 설계공모 일정	4

4. 참가신청 (등록)	5

5. 현장설명자료 홈페이지 게시	5

6. 질의 및 답변	5

III. 공모안 제출 및 작성지침	7

1. 공모안 제출	7

2. 제출도서 작성지침	8

3. 제출도서의 검수	10

IV. 심사 및 당선작 선정	11

1. 심사일정	11

2. 심사 전 기술검토	11

3. 심사위원회 구성	12

4. 심사위원 명단	12

5. 심사방법	12

6. 심사결과 발표 및 제안보상	14

7. 승계	14

8. 기타사항	15

V. 세부설계지침	17

1. 설계 방향	17

2. 대상지 현황	23

3. 시설기준표	26

VI. 서식	28

사업개요

설계공모의 배경 및 목적

가. 서부산권 신도시 개발에 따른 인구 유입으로 인한 학생 수 증가에 대응하기 위하여 교육기관을 설립하고자 함.

나. 교육과정 운영 및 교수학습 방법에 따른 공간구성, 교육시설과 지역사회 연계, 에너지 효율화 등을 통한 새로운 학교의 기준점 제시.

다. 건축 설계자를 선정함에 있어 설계공모를 통하여 보다 창의적이고 사용 목적에 부합된 설계(안)을 제출하는 설계자를 선정함으로써 부산교육의 위상을 드높이고 교육시설의 발전을 도모함.

사업개요

가. 사 업 명: (가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모

나. 대지위치: 부산광역시 강서구 강동동 4211-1번지 일원

다. 학급수, 학생수 : 완성 시점 추정 및 적용기준

- 초등학교: 39학급(특수학급 1학급 포함), 1,055명

라. 대지면적: 14,040㎡

마. 건축연면적: 12,528㎡이하

※ 연면적은 기준 면적에서 -5% 이내에서 계획

허용실별면적은 시설기준표 면적에서 ±5% 이내에서 계획 허용

※ 향후 학생증가를 고려하여 증축이 가능하도록 계획(구조포함)한다

바. 지역지구: 제2종일반주거지역, 제1종지구단위계획구역, 학교

사. 예정공사비: 금24,495,651,000원 정도(부가가치세 포함)

※ 건축, 토목, 조경, 기계설비, 폐기물처리 등에 대한 예정공사비이며(각종 인입에 따른 시설분담금포함), 발주청의 요구수준에 적정하게 설계가 이루어져야 한다.

아. 설계용역비: 금925,869,330원(부가가치세 포함)

※ 설계용역비에는 지질조사 8공, 설계에 필요한 각종 조사, 실시계획인가 등 인허가 서류작성 및 관련기관 협의, 설계의 안전성 검토, 제로에너지건축물인증, 녹색건축물 인증, 장애물없는생활환경인증, 신재생에너지 설치 등등 관련 법령을 준수하여 설계 및 허가에 필요한 제반사항 포함임. (각종 인증 및 조사비용은 별도 산정하여 설계용역비에 반영)

자. 설계기간: 용역 착수일로부터 180일간

※ 설계용역 계약 시 우리교육청 사정에 의해 변경될 수 있음.

설계공모 운영 일반지침

설계공모 방법: 일반 설계공모(전국공모)

설계공모 응모 자격

가. 기본조건

1) 공고일 현재 「건축사법」에 의한 건축사자격을 소지하고, 같은 법에 의하여 건축사업무 신고를 필한 자로서 같은 법에 의한 결격 사유가 없는 자.

2) 건축설계공모 공고일부터 결과발표일까지 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 부정당업자 및 기타 이와 유사한 행정처분(「건축사법」 제30조의3)을 받지 않은 자.

3) 외국 건축사 자격을 취득한 자로서 「건축사법」에 의한 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 한 자(단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다).

4) 이 사업 및 설계공모와 관련한 발주기관의 소속 직원, 사전기획용역 참여건축사, 기술검토위원·심사위원 당사자 및 당사자가 속한 조직 등 기타 본 공모와 직간접적으로 관계된 자는 본 공모에 응모 및 계약할 수 없다.

5) 1개의 건축사사무소에서 2개의 안을 응모를 할 수 없다.

나. 추가조건

1) 공동응모 하고자 하는 경우에는 공동응모 건축사 중에서 1인을 응모대표자로 지정하여야 한다.(단, 공동응모 시 2개사를 초과할 수 없음)

2) 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「건설기술진흥법」 및 정부회계 예규 및 관련규정에 따른다.

3) 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」의‘제7장 설계공모 운영요령’에 따라 단독 응찰시 무효로 하고 건축설계공모를 재공고 할 예정임 (2인 이상 제안서 제출 시 건축설계공모 평가예정)

설계공모 일정

표 1. 공모일정

구분		일시	유의사항
공고		2025.4.15.(화)	일반 설계공모(전국공모)
참가신청 (등록)		2025.4.17.(목)~2025.4.23.(수) 16시까지	이메일접수(minjjx@korea.kr) *메일 확인후 접수확인 메일 일괄 회신
현장설명		2025. 4. 21.(월) (현장설명자료 홈페이지 게시)	부산광역시교육청 홈페이지 (http://www.pen.go.kr)→사용자별정보→ 부서별자료실→미래학교설립과→ 건축설계공모 게시
1차 질의	접수	2025.5.8(목)~5.9(금) 17:00까지	서면질의 서식사용 이메일접수(minjjx@korea.kr)후 메일 회신
	답변	2025.5.14.(수)	부산광역시교육청 홈페이지 (http://www.pen.go.kr)→사용자별정보→ 부서별자료실→미래학교설립과→ 건축설계공모 게시
2차질의	접수	2025.5.15.(목)~5.16.(금) 17:00까지	서면질의 서식사용 이메일접수(minjjx@korea.kr)후 메일 회신
	답변	2025.5.21.(수)	부산광역시교육청 홈페이지 (http://www.pen.go.kr)→사용자별정보→ 부서별자료실→미래학교설립과→ 건축설계공모 게시
공모안 제출		2025.7.2.(수) 14:00~16:00	방문접수 : 부산광역시교육청 본관 지하1층 소담정1 (감사담당공무원 입회)
기술검토		2025.7.3.(목)	심사 전 법규 및 지침위반 검토
작품심사		2025.7.14.(월)	공모안 제출자 PT 발표 준비 ※발표 및 질의응답 시간은 각 10분 이내
결과 발표		2025.7.18.(금) (예정)	부산광역시교육청 홈페이지 (http://www.pen.go.kr)→사용자별정보→ 부서별자료실→미래학교설립과→ 건축설계공모 게시
시상			추후 공지

※ 위 일정은 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 별도 통보

참가신청(등록)

가. 등록일시: 2025. 4. 17.(목) ~ 2025. 4. 23.(수) 16시까지

나. 등록방법: 전자우편 주소(minjjx@korea.kr)로 구비(제출)서류 스캔본 제출

※ 접수 확인 메일 전송, 우편 또는 방문 접수는 불가

다. 구비(제출)서류 - 스캔본(PDF파일)

1) 건축설계공모 응모신청서 [서식1]

2) 서약서 [서식2]

3) 사전접촉금지 서약서 [서식3]

4) 공동응모협정서(공동 참가 시) [서식4]

5) 대표자(건축사)선임계(공동 참가 시) [서식 5]

6) 사업자등록증

7) 건축사자격증(국외 건축사자격증 포함, 한글번역본 추가제출)

8) 건축사사무소등록증

※ 6), 7), 8) 항목은 공동 참가 시 참가회사 각각 제출

※ 구비서류 일체 하나의 PDF 파일로 제출할 것

현장설명자료 홈페이지 게시

가. 일시: 2025. 4. 21.(월)

나. 게시 장소: 부산광역시교육청 홈페이지(http://www.pen.go.kr)→ 교육청 및 산하기관→미래학교설립과→건축설계공모 게시

다. 내용: 위치도, 기존 건축물 현황도면(캐드파일), 사전기획보고서 등 설명자료

※ 현장설명 관련자료 홈페이지 게시

질의 및 답변

가. 1차 질의 및 답변

1) 질의접수: 2025. 5. 8.(목) ~ 2025. 5. 9.(금) 17:00까지

2) 질의답변: 2025. 5. 14.(수)

나. 2차 질의 및 답변

1) 질의접수: 2025. 5. 15.(목) ~ 2025. 5. 16.(금) 17:00까지

2) 질의답변: 2025. 5. 21.(수)

다. 질의접수 및 답변회신

1) 질의접수방법: e-mail로 제출 minjjx@korea.kr

※ 응모자(업체)별 대표자에 한해 1회 서면질의 접수 가능

[서식 6] 설계공모 서면질의서 서식 활용

※ 질의회신 내용과 지침서에 따라 공모안을 작성·제출하여야 하며, 위반 시 평가 불이익에 대한 모든 책임은 공모안 제출자에게 있다.

2) 회신방법: 부산광역시교육청 홈페이지(http://www.pen.go.kr)→ 교육청 및 산하기관→미래학교설립과→건축설계공모 게시

3) 유의사항

가) 질의사항에 대한 답변내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것 으로 간주한다.

나) 접수된 질의서의 내용이 설계공모지침과 직접 관련이 없는 사항이나 질의서가 관련 서식과 상이한 경우는 답변하지 않는다.

공모안 제출 및 작성지침

공모안 제출

가. 제출일시: 2025. 7. 2.(수) 14:00 ~ 16:00

나. 제출장소: 부산광역시교육청 본관 지하1층 소담정1

다. 제출방법: 직접방문제출 (우편접수 불가)

라. 제출서류의 종류

1) 건축설계공모 제안서 [서식7]

2) 건축설계공모규정 동의서 [서식8]

3) 작품 활용동의서(출판 동의 포함) [서식9]

4) 위임장 및 재직증명서(대리인이 제출할 경우에 한함)

5) 인감증명서 1부

6) 사용인감계 1부 [서식10]

7) 법인등기부등본 1부(법인에 한함)

8) 공동응모협정서 1부 [서식4]

9) 청렴서약서 [서식11]

10) 사전접촉 여부 확인서 [서식12]

11) 접수일 및 작품제출일 기준 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 부정당업자 등 이와 유사한 행정처분(「건축사법」 제30조의3)을 받지 않음을 증빙하는 서류 제출(공동응모 사무소도 관련 증빙서류 제출)

※ 결과발표일까지 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 부정당업자 및 기타 이와 유사한 행정처분(「건축사법」 제30조의3)을 받지 않아야함.

12) 참가 등록 시 제출한 스캔본의 원본 각 1부

마. 제출도서 종류

1) 설계설명서 및 설계도면 14부(보관용 1부, 심사용 13부)

2) 배치도, 조감도 각 1매(심사시 게시용으로 별도 제출, 회사명 기재 불가)

3) CD 또는 DVD 1매(제출서류, 설계설명서, 구적도 수록)

제출도서 작성지침

가. 제출도서의 종류, 규격 및 수량

표 2 제출도서의 종류, 규격 및 수량

종 류	규 격	수량	매수(쪽수)	비 고
설계설명서 및 설계도면	A3 (420×297mm)	14부	20쪽 이하	표지제외
배치도, 조감도	A3 (420×297mm)	각 1매	각 1매	심사용 (벽면 게시)
CD 또는 DVD	Ⅲ.-2.-나.-3) 참조	2개

나. 작성지침

1) 공통사항

가) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하며, 배경무늬를 사용할 수 없다.

나) 주요 실의 명칭은 해당 실에 직접 기재한다.

다) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법(소수 둘째자리까지 표현할 것)을 사용한다. 단, 부득이하게 영문 표기가 필요한 경우 병행 표기할 수 있다.

라) 제출된 도서는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

마) 제출도서에 암호 등을 기입하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 한다.

바) 규격 : A3(가로 420㎜×세로297㎜)로 작성하여 테두리 없이 접착제를 이용하여 좌측 제본하여 제출

사) 부수 : 14부 - 14부 중 보관용 1부(제출자 확인용)는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재ㆍ날인하고, 심사용 13부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다. (보관용 1부 포장방법-Ⅲ.2.다. 참조)

아) 지질(紙質): 표지용지는 순백색 스노우지 사용, 내용지는 백상지(80g/㎡ 이하) 사용, 배치도 및 조감도는 백상지만 사용(별도의 보드판 부착금지)

자) 쪽수 산정은 아래와 같다.

	【쪽수 산정 방법】
- 앞표지와 뒷표지는 쪽수 산정에서 제외 - 간지·백지를 삽입한 경우도 쪽수에서 제외 - 단면 인쇄 목차 별도 삽입시 쪽수 산정 됨

차) 표지는 제공된  [서식16]의 양식대로 작성하고, 내용지는 상하 20mm, 좌우 25mm의 여백을 둔다. 내용 중 대제목은 28포인트, 소제목은 16포인트, 본문 내용은 12포인트로 하고 MS Powerpoint로 작성한다. (글씨체는 굴림체만 사용가능함.)

2) 설계설명서 및 설계도면

가) 분량 : 20쪽 이하

나) 입지현황 및 법규검토의 항목 작성 시 반드시 현장조사를 철저하게 실시한 후 작성하여야 하며, 실제 현장에 대한 내용 및 사진을 게재 하고 그에 대한 설명을 하여야 한다.

다) 설계설명서에 포함되어야 할 내용 및 작성순서는 아래와 같다(색채 사용가능)

① 조감도 또는 투시도 5컷(실내 주요 투시도 2컷 이상 포함) 이내

※ 설계설명서에 조감도 또는 투시도 5컷 이외 사용 불가(동일 컷 중복 사용 가능)

※ 조감도 또는 투시도의 표현은 렌더링하지 않은 3차원 이미지일 것

렌더링이란 글로벌 일루미네이션(Global Illumination) 기법을 사용하거나 별도의 플러그인(Plug-in) 카메라를 사용하는 것을 포함하며, 건축물의 표현을 왜곡할 가능성이 있는 모든 기법의 사용을 포괄한다. 조감도 및 투시도는 정확한 3차원 정보를 전달하는 방식으로 작성해야 하며, 그림자, 색상, 투명도, 재료 등을 표현할 수 있되, 라인드로잉 기반의 투시도를 권장한다.

② 입지현황 및 설계개요(건축개요 및 실별 면적개요 등)

③ 주요계획 개념

④ 주요 제안사항

⑤ 기타 미래형 학교에 대한 개념

라) 설계도면에 포함되어야 할 내용 및 작성순서는 아래와 같다(색채 사용불가)

※ 단, 설계도면을 표현하는 쪽에는 여백을 활용한 어떠한 삽도, 개념 다이어그램 등의 표현도 금지(위반 시 심사 불이익 처분)

① 배치도 및 동선계획도(보행자, 차량, 서비스 동선 표기)

② 각 층별 평면도 및 평면부분 상세도(창의적 공간구성에 대한 표현)

③ 입면도(4면 이상)

④ 단면도(종·횡단면도 등 2면 이상)

⑤ 추정 예상 공사비 개략내역서[서식14]

⑥ 재료마감표, 관련 법규검토서[서식15]

3) CD 또는 DVD

가) 포함내용

표 3 CD 또는 DVD 포함내용

폴더명	파일명	파일형식
설계설명서(접수번호)	설계설명서 및 설계도면	pdf
Document(접수번호)	제출서류	pdf
구적도(접수번호)	구적도	dwg

나) 설계설명서 및 설계도면, 제출서류 파일은 각 100Mb를 넘지 않도록 한다.

다. 도서 제출방법 및 유의사항

1) 제출 도서는 심사용과 보관용을 구분, 포장하여 제출한다.

2) 심사용 13부는 백색포장지로 설계설명서 및 설계도면, CD 또는 DVD 1매를 함께 포장하여 제출서류 1부와 함께 제출한다.

3) 심사용 배치도와 조감도는 별도로 A3 서류봉투에 넣어서 제출한다.

4) 보관용 1부는 백색포장지로 설계설명서 및 설계도면을 포장하여 제출한다.

5) 상기 제출도서 목록에 열거한 도서류 이외의 것은 제출할 수 없다.

6) 설계공모안 제출은 직접 방문하여 제출하여야 하며 우편접수는 받지 않는다.

7) 설계공모 참가등록을 한 자의 작품에 한하여 접수한다.

8) 작품의 제출은 1회에 한하며, 제출된 작품에 대하여는 추가제출이나 수정 및 보완 작업을 할 수 없다.

9) 지침서에 명기된 작성 요령 및 제출 방법에 적합하지 않은 작품은 접수하지 않거나, 심사 시 불이익을 줄 수 있다.

10) 제출 도서 중 상호 불일치로 인해 발생하는 문제는 설계공모 참가자 책임으로 한다.

11) 제출된 작품에 대하여 기술검토위원이 기술검토에 필요한 추가 자료 요청 시 제출해야 한다.

제출도서의 검수

1) 참가자의 설계도서가 접수되면 발주기관은 감사담당 공무원의 입회하에 제출도서 부수를 확인하고 임의의 심사번호를 부여하여 심사가 완료될 때까지 심사번호 만을 사용한다.

2) 보관용은 심사결과 발표 시까지 공개하지 않는다.

심사 및 당선작 선정

심사일정

가. 1차 심사 : 2025. 7. 14.(월) 2차 심사 발표작 선정(5작품)

나. 2차 심사 : 2025. 7. 15.(화) PT발표 *10개 작품 미만 접수 시 1차, 2차 심사를 통합해서 진행할 수 있다.

※ 10개 작품 미만 접수 시 1차 심사일에 1차, 2차 심사를 통합해서 진행한다.

※ 일정은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 참가자들에게 일괄 통보한다.

※ 심사위원회의 진행은 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음한다.

심사 전 기술검토

제출된 작품에 대하여 관련 법령과 공모 지침의 위반사항을 검토하고 기술검토서를 작성하여 심사 전 심사위원회에 전달하며, 심사위원회에서는 이를 바탕으로 실격 혹은 심사 불이익 처분을 결정한다. (단, 연면적 허용범위 초과시 실격)

표 4 심사 반영 기술검토 항목

구분	검토 항목	비고
제출도서 제출 및 작성지침 위반	1. 제출도서 제출 수량 부족 시	심사에 불이익 처분
	2. 제출도서 기준 쪽수 제한 위반
	3. 제출도서 앞․뒤 표지의 작성지침 위반
	4. 축척(배치도, 평면도, 입면도) 및 방위(배치도) 표시 누락
	5. 제출도서 작성지침을 준수하지 않고 임의로 작성한 경우(설계도면 표현 방식 등)
법령 위반, 지침 위반 등	제출도서 작성지침을 현저히 위반한 경우 (연면적 허용범위 초과, 렌더링, 표현방식 등)	실격
	2. 중대한 법령 위반, 공사비 초과 등으로 공모안의 내용으로 공사가 어려운 경우
	3. 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 표기가 있는 경우
	4. 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모하거나 1개 사무소가 2개의 안을 응모한 경우
	5. 공동응모인 경우 대표업체의 중도탈퇴
	6. 표절 등 저작권법 위반
	7. 심사위원 사전접촉 등 불공정행위 적발시

심사위원회 구성

1) 심사위원회 구성은 국토교통부 고시 「건축 설계공모 운영지침」에 따른다.

2) 심사위원 기피․회피 신청은 국토교통부 고시 「건축 설계공모 운영지침」에 따라 공모안의 제출 마감일로부터 7일 전까지 심사위원 기피․회피 신청서 및 그 근거자료를 제출하여야 한다.

- 제출방법: e-mail로 제출 minjjx@korea.kr

- [서식 13] 심사위원 기피․회피 신청서 서식 활용

심사위원 명단

연번	소속	성명	비고
1	동의대학교	김희근	위 원
2	국립부경대학교	오장환	위 원
3	경상국립대학교	강석진	위 원
4	인제대학교	고인석	위 원
5	건축사사무소 cmm	방기애	위 원
6	소토 건축사사무소	지석우	위 원
7	건축사사무소 오프니스	이대용	위 원
8	㈜네오 종합건축사사무소	이병주	기술검토위원
9	건축사사무소 더존	조은숙	기술검토위원
10	국립창원대학교	정성문	예비위원
11	(주)가가건축사무소	안용대	예비위원

* 예비심사위원은 심사위원의 참여가 곤란한 경우, 심사위원으로 참여하며 심사위원의 특별한 사정이 없는 경우라도 예비심사위원 당사자가 희망 시 심사 전 과정을 참관할 수 있음.

* 심사 총량제 적용(각 심사위원의 건축 설계공모 심사 참여 횟수 월 2회 및 연 12회 초과할 수 없음, 타기관 포함)

심사방법

심사방법

가. 발주기관에서 임의로 심사번호(고유번호)를 부여하여 공정하고 합리적으로 심사한다.

나. 심사위원회는 위원 중 과반수 참석 시 진행할 수 있다.

다. 심사위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

라. 심사위원장은 심사위원들의 의견을 수렴하여 심사방법을 결정하여 진행 할 수 있으나, 특별한 사정이 있지 아니한 경우 토론에 따른 투표제를 우선 적용한다.

마. 심사는 1차 심사와 2차 심사의 2단계로 진행한다.

1) 1차 심사 : 2025. 7. 14.(월)

1차 심사는 기술검토위원이 작성한 기술검토서를 확인하여 실격 및 심사의 불이익 처분을 결정하고, 심사위원회에서 정하는 방법에 따라 본선에 진출할 5개 이하의 작품을 선정한다. 단, 심사위원회의 의결에 따라 작품의 수량은 변경될 수 있다.

2) 2차 심사 : 2025. 7. 15.(화)

2차 심사는 본선 진출한 참가자의 발표 및 질의응답 실시한다.

바. 응모작품이 10개 미만일 경우 1차, 2차 심사를 통합해서 진행할 수 있다.

1) 1차, 2차 통합 심사일은 1차, 2차 심사일 중 하루로 정한다.

2) 1차, 2차 통합 심사로 진행 시 심사 당일 모든 참가자의 발표 및 질의응답을 원칙으로 한다.

사. 심사 일자 및 방법은 공모안 제출일 이후 참여자에게 개별 안내하며, 발주처의 사정에 따라 변경될 수 있다.

※ 발표 방법

- 발표자는 제출된 설계설명서 및 설계도면만을 활용하여 발표하며, 별도의 발표용 자료를 제출하지 않는다.

- 발표시간은 10분, 질의응답시간 10분을 원칙으로 하되, 발표 및 질의응답 시간은 심사위원회에서 적정하게 운영할 수 있다.

- 발표자는 대표자를 원칙으로 하되, 대리인이 참여할 수 있다. 대리인은 공모공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자에 한하며, 발표 당일 재직기간이 명기된 재직증명서 및 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)을 지참하여 해당 사항을 확인받아야 한다.

- 발표순서는 발표 당일에 공개 추첨을 통해 결정한다.

- 발표자는 심사당일 별도 공지 시각까지 지정된 장소에 출석하여야 하며, 불출석하거나 재직기간 및 신분을 확인할 수 없는 경우 실격 처리한다.

- 타 작품과의 비교설명, 시간 초과 등 발표자가 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위를 하는 경우, 심사위원장은 발표를 중지시킬 수 있다.

- 심사위원은 결정된 심사방법에 따라서 평가하며, 각 공모(안)의 평가사유서는 구체적으로 작성함을 원칙으로 한다.

- 발주기관에서는 빔프로젝트, 노트북 등을 준비한다.

바. 기술검토위원이 작성한 기술검토서를 확인하여 실격 및 불이익 처분에 대해 결정하고, 심사위원회에서 정하는 방법에 따라 5개 이하의 작품을 선정한다. 단, 심사위원회의 의결에 따라 작품의 수량은 변경될 수 있다.

사. 심사는 심사위원회에서 정한 방법에 따라 당선작, 입상작을 결정한다.

아. 심사위원회의 진행은 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개하며, 심사내용을 녹화 또는 녹음한다.

자. 심사위원회는 응모작품의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있으며, 상기 이외의 세부사항은 「건축 설계공모 운영지침」을 준용한다.

심사결과 발표 및 제안보상

가. 발표일시: 2025. 7. 18.(금)

나. 발표방법: 부산광역시교육청 홈페이지(http://www.pen.go.kr)→ 교육청 및 산하기관→미래학교설립과→건축설계공모 게시

다. 발표내용: 평가사유서, 공모안 등을 심사위원과 설계공모 응모자의 실명과 함께 공개한다. 다만, 발주기관 등의 필요에 따라 입상하지 못한 설계공모 참가자의 실명 및 관련 심사결과를 비공개할 수 있다.

라. 제안보상

1) 당선작 1점: 설계용역권 부여

2) 발주기관 등은 기타 입상자의 공모안 작성비용 일부를 보상하기 위하여 금74,000천원(금칠천사백만원)의 범위 내에서 다음과 같이 지급한다.

가) 기타 입상자가 4인인 경우: 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

나) 기타 입상자가 3인인 경우: 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2을 지급

다) 기타 입상자가 2인인 경우: 공모심사 점수가 높은 자 순으로 예산의 10분의 4, 10분의 3을 지급

라) 기타 입상자가 1인인 경우: 예산의 3분의 1을 지급

마. 기타사항

1) 위원회 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 및 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

2) 응모자는 심사결과에 대한 이의를 제기할 수 없다.

3) 설계비와 보상금에 대한 세금은 대한민국의 세법을 적용하여, 보상금은 세금공제 후 지급한다.

4) 보상금에는 저작권료, 전시 및 출판권이 포함되어 있다.

5) 보상금은 공동응모의 경우 공동응모 비율로 각 회사의 대표자에게 지급한다.

승계

다음의 경우에는 당선업체에 부여하는 설계용역권을 공모심사 순위가 높은 자 순으로 승계할 수 있다. 이 경우 용역권 승계자의 보상금은 반납하여야 한다.

가. 당선업체가 기본․실시설계 용역권을 포기할 경우

나. 당선작이 실격, 무효 등에 해당되는 사실이 발견된 경우

다. 당선업체가 결과발표일로부터 계약체결이전일까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 부정당업자 등 이와 유사한 행정처분(「건축사법」 제30조의3)을 받는 등 여건변화로 기본 및 실시설계에 필요한 법적요건이 미비할 경우

라. 당선업체가 기타 이유로 기본 및 실시설계의 원활한 작업이 불가능하게 된 경우

마. 당선업체가 확보한 예산보다 많은 설계용역비를 요구한 경우

바. 제출한 도서의 내용이 고의적인 왜곡으로 진실과 부합되지 않거나 제안자의 귀책사유로 인한 예산의 과다한 초과 등의 이유로 사업의 순조로운 진행이 불가능하게 될 경우 제안자는 본인의 비용으로 설계를 변경하여 시행자가 감당할 수 있는 일정 내에서 사업을 추진할 수 있도록 해야 하며, 이러한 노력을 거부하거나 노력에도 불구하고 예산 초과나 기술적 사유 등으로 사업 진행에 심각한 차질이 생길 경우

기타사항

가. 당선작 설계자의 의무

1) 당선작 설계자는 업무추진단(촉진자 포함)의 보완요구 사항과 발주기관의 요구사항을 협의하여 반영한다.

※ 촉진자 : 사용자, 교육청, 실무자 간의 합리적인 조정과 중재를 통해 요구 성과를 도출하는 역할을 하는 학교공간혁신 전문가로서 교육청에서 지정함

2) 당선작 및 입상작의 설계자가 허위, 부당한 방법으로 당선 및 입상된 경우에는 발주기관은 당선작에 대하여는 당선 무효로 하여 당선자와 계약을 체결하지 않거나 계약을 무효로 할 수 있으며, 입상작에 대하여는 입상을 무효로 한다. 이 때 당선(입상) 보상금을 반환하여야 한다.

3) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 요청하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 한다.

4）당선자가 해당학교의 설계용역 수행이 불가능할 경우 차점자에게 설계권을 부여할 수 있다. 이 경우 차점자의 기 수령 보상금은 반환한다.

5) 당선자는 기본 및 실시설계 시 별도의 과업지시서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 한다.

6) 당선자는 발주기관의 요청에 따라 ‘설계 의도 구현’을 위하여 업무에 협조하여야 하며, 그에 따른 대가는 설계비와 별도로 산정한다.

나. 저작권 및 출판전시

1) 참가작은 창작품이어야 하며 타인의 저작권을 침해하여서는 안 된다. 타인의 저작권 침해에 따른 모든 책임은 참가자(팀)에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

2) 참가작품의 모든 권리(저작권, 소유권 포함)는 참가자(팀)에게 있다. 필요한 경우 참가작에 관한 저작권을 양도받거나 이용 허락을 받을 수 있으며, 이 경우 참가자(팀)와 별도로 약정하여 정한다.

3) 우리 교육청은 당선작 및 입상작을 당선자(팀) 및 입상자(팀)와 별도의 보상 및 협의 없이 보고서, 출판 및 전시할 수 있으며, 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 한 신문, 방송, 인터넷 또는 기타매체에 제공할 수 있다. 이 경우 당선자(팀) 및 입상자(팀)은 작품의 사용과 관련한 협조를 할 수 있고, 응모작을 제출함으로써 이에 동의한 것으로 간주된다.

다. 응모제안서의 반환

1) 제출된 응모제안서는 반환하지 않는다.

라. 유의 사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사하여야 하며, 당해 부지 및 인접지의 여건을 고려하여 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계 법규 및 제반 규정에 적합하게 계획하여야 한다.

3) 응모자가 부정한 방법으로 응모하거나 심사결과에 영향을 미치는 행위를 한 경우에는 실격으로 한다.

4）공모지침 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우와 지침 내용에 있는 사항에 대하여는 발주기관과 심사위원회의 해석에 따라야 한다.

마. 기타사항

1) 공모일정의 변경이 불가피할 경우, 변경된 일정을 우선 유선으로 통보하고 E-mail를 이용하여 참가 등록한 모든 참가자에게 통지한다.

2) 본 설계공모 진행 기간 중 설계공모 참가자 주소 또는 연락처 등의 내용이 변경되었을 경우, 그 변경된 내용을 신속히 주관부서에 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 설계공모 참가자에게 있다.

3) 기타 문의사항은 부산광역시교육청 미래학교설립과 설계공모팀

(☏051-860-0577)으로 문의 바랍니다.

세부설계지침

설계 방향

▣ 설계 주안점

1) 1, 2학년 – 3, 4학년 – 5, 6학년 군으로 나누어 학생 수요 및 교과과정의 변화에 신축적으로 대응할 수 있도록 공간 간 통합, 분리, 연계가 가능하도록 할 것

2) 공용공간에는 안전과 소음에 취약한 독서스텝과 같은 스탠드공간은 지양한다.

3) 외부공간은 교육과정과 연계한 유연하고 다양한 공간 및 휴식과 소통공간이 될 수 있도록 계획

(학습공간과 연계할 수 있는 생태체험공간 조성(테마별로 생태녹지, 학습장 , 텃밭 등 )

4) 학생 수요 및 교과과정의 변화에 신축적으로 대응할 수 있도록 공간 간 통합, 분리, 연계가 가능하도록 가변성 있는 교실 제안

5) 급식실(조리공간)은 공사기간 단축과 사용시 하자발생 최소화를 위하여   1층 배치를 권장

6) 지하피트 및 공동구 최소화

7) 지역사회에 개방 가능한 공간(도서관 및 강당)은 개방형 공적공간의 개념을 도입하여 외부에서의 접근성을 고려한 외부인의 출입 및 통제가 가능하도록 별도동선 계획

8) 소규모 실내체육공간은 초등학교에서 활용도가 높으므로 다양한 학습활동공간이 될 수 있도록 조성

9) 보차분리하여 보행자와 차량동선 교차는 최소화하며, 옥외공간 간의 보행동선과 차량동선이 겹치지 않도록하여 안전한 외부동선계획을 수립

10) 인접 공동주택과의 거리 등을 고려하여 소음 등 주변에 대한 환경을 반영한 건물 배치를 계획

가. 일반사항

1) 설계안 제출 시점에서 관계 법규(입법예고 포함) 및 지침(부산 에코델타시티 친수구역 조성사업 지구단위계획 시행지침-건축,특별,경관,환경)에 적합하여야 한다.

2) 현장 여건을 정확히 조사한 후 자연환경, 입지조건 소음(인접 공동주택과의 거리 등) 등을 분석하여 계획에 반영하여야 한다.

3) 미래의 인재 양성을 위한 기반 시설로써 학생중심의 협동학습, 창의적 융복합 교육 등 미래 혁신교육에 필요한 다양하고 유연한 공간을 조성하며, 교육과 관련한 대내외적 환경변화에 대비할 수 있도록 계획한다.

4) 구조와 시공상 안전하면서 경제적인 설계를 수행하여야 하며, 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 계획한다.

5) 범죄를 예방하고 안전한 생활환경을 조성하기 위한 범죄예방 환경설계(CPTED)를 적용한다.

6) 무장애(Barrier Free) 시설물로 계획하여 장애인을 포함한 이용자 모두의 편의를 고려한다.

7) 학교시설 에너지 절약형 건축물 확보를 위한 기준에 적합하게 계획한다.

8) 시공이 용이한 국산자재(KS)를 사용함을 원칙으로 하고 사후 관리의 편의성 및 호환성이 좋은 제품을 선택한다.

9) 건축물의 이미지 및 각 실의 성격에 적합한 마감계획을 수립하고 시설물 내․외부 마감 재료는 내구성이 우수하며, 유지관리에 적합한 질감, 색채 등을 선택하고 에너지효율, 방음, 방습 등을 고려한 합리적인 재료를 설계에 적용한다.

10) 환경친화적이고 유지관리에 경제적인 시설로 계획한다.

11) 최근 개정된 ‘실내공기질관리법’에 따라 다중이용시설의 실내공기질 유치기준에 부합되도록 설계하여야 한다.

12) 어린이활동공간에 있어‘환경보건법’및 동법 시행령‘(별표2) 어린이활동 공간에 대한 환경안전관리기준’을 준수하여야 한다.

나. 배치 및 동선계획

1) 토지를 효율적으로 이용하고, 녹지 및 개방공간을 최대한 확보한다.

2) 에코델타시티의 특성과 인접 부지를 고려하여 계획한다.

3) 일조환경, 부지 내・외부 고저 차이, 교통체계 등 대상부지의 여건을

고려하여 배치하고 진출입 동선을 계획한다.

4) 옥외공간 및 시설물이 교육적 기대에 부응할 수 있도록 계획하며 다수의 이용에 있어 접근성, 안전성이 확보되고 공공시설물로서 다양한 활동이 가능하도록 계획한다.

5) 주민이용을 감안한 시설(다목적강당 및 도서관)의 경우 외부에서의 접근성을 감안하여 배치하고 별도 동선을 계획한다.

6) 법적 주차면수 이상 확보하고, 보행안전을 위한 보차분리 및 시설이용자(교육대상자, 주민 등) 및 이용특성(비상대피, 서비스 하역, 소방진입 등)을 고려한 구분된 동선계획을 수립한다.

7) 보행자 출입구는 학생들의 접근방향을 고려하여 설치하되, 공동주택단지와의 연결성을 고려한다.

8) 급식실(조리공간)은 공사기간 단축과 사용시 하자발생 최소화를 위하여1층 배치를 권장한다.

다. 공간계획

1) 미래교육에 대응하며 창의성과 융합적 사고를 키워주는 다양한 공간설계가 되도록 한다.

2) 학생 수요 및 교과과정의 변화에 신축적으로 대응할 수 있도록 공간 간 통합, 분리, 연계가 가능하도록 가변성 있는 건축적, 설비적 방안을 제안한다.

3) 학습, 토론, 휴식 등 다양한 활동이 가능한 개방형 공간을 계획하며, 유연한 공간구성으로 인해 다양한 방식의 수업 및 학생들의 활동이 가능하도록 한다.

4) 소요되는 각 시설 및 공간의 종류, 규모, 배치는 공간계획 자료를 참고하여 효율적인 학교운영이 가능하도록 계획한다.

5) 실의 용도에 맞는 모듈을 선정하고 연계 가능한 공간 간 통합·분리가 가능하도록 가변성이 있도록 계획한다.

6) 공용공간(로비, 복도 등)에서도 교육프로그램을 지원하고, 교육적 지도가 용이하며, 학생 간 폭넓은 교류가 가능하도록 계획한다.

7) 소규모 실내체육공간은 초등학교에서 활용도가 높으므로 다양한 학습활동공간이 될 수 있도록 조성한다.

8) 각각의 영역에 대한 개별성과 독자성의 실현 및 개별 공간에 대한 적절한 기능적, 물리적 연계방법을 적용한다.

9) 창의적인 교육 효과를 고려한 내부공간 배치(남향 위주의 일자형 배치가 아닌 모듈을 조합하여 순환구조나 홀 공간을 상호 공유하는 교실배치 등 가능)로 창의적 교육 공간을 제안한다.

10) 환기 및 채광 환경이 양호하게 형성될 수 있도록 친환경적(active or passive system 등) 아이디어를 도출하여 쾌적한 실내 환경을 조성한다.

11) 도서실은 다양한 기능을 융합하여 개인공간 및 자유로운 소통이 가능한 공간으로 계획한다.

라. 세부공간계획

[학년 교실군]

1) 1, 2학년 – 3, 4학년 – 5, 6학년 군으로 나누어 학생 수요 및 교과과정의 변화에 신축적으로 대응할 수 있도록 공간 간 통합, 분리, 연계가 가능하도록 가변성 있는 교실을 통해 학년 통합수업 및 학습공간의 확장되도록 한다.

2) 전자칠판, 자료검색대, 개별학습공간, 자유로운 배치 가능한 가구 계획

3) 출입이 용이한 위치 및 도서관과 가까운 위치에 돌봄교실 배치

4) 교실군과 외부공간 접촉을 용이하게 계획하여 공간의 확장성 확보

[도서관 및 커뮤니티 공유공간]

1) 도서관 공간영역은 모듈형 단일공간에서 벗어나 학교 커뮤니티 공간의 중심이 되도록 하고, 지역주민과의 공유공간을 제공

[특별실 영역]

1) 특별교실은 보통교실과 구분배치하여 동선의 효율성 확보

2) 통합 가능한 프로그램을 그룹화하여 공간의 융합을 통해 여유 면적을 공유공간으로 활용

[다목적공간 영역]

1) 단순한 강당 및 실내체육공간 기능에서 탈피하여 공간 개념의 확장을 통해 다목적 융합 공간으로 전환하고 공간 내 가변성 및 유연성 부여

2) 강당에는 각종 기자재들(띔틀 등 부피가 큰 체육기구)을 보관할 수 있는 창고가 필요

[공유공간영역]

1) 공용공간(복도,로비 등)은 단순 통로기능에서 벗어나 학습공간의 확장 공간 및 커뮤니케이션 발생 공간, 자유로운 활동 영역 공간으로 계획(휴게 및 허브공간 등)

2) 공용공간에는 소음을 발생시키고 안전에 취약한 활동적인 유희공간(ex. 암벽등반 등)의 배치를 지양한다.

3) 공용공간에는 안전과 소음에 취약한 독서스텝과 같은 스탠드공간은 지양한다.

[급식실]

1) 급식실(조리공간)은 공사기간 단축과 사용시 하자발생 최소화를 위하여 1층 배치를 권장한다.

2) 급식동선의 효율선을 위해 식당과 급식실 층분리를 지양한다.

마. 입면계획

1) 입면계획은 학교의 특성과 주변경관을 고려하고, 기존 경관과 어울리고 동시에 경제성을 고려하여 과도한 디자인이 되지 않도록 한다.

2) 내구성과 내후성을 겸비한 외장재를 적용하여 원활하고 경제적인 유지관리 및 학교 이미지를 유지할 수 있도록 제안한다.

3) 본 시설의 목적과 무관한 유행에 따르거나 기능과 무관한 과도한 디자인은 지양하고 창의적인 디자인을 제안한다.

바. 기타

1) 이용자의 제 활동 등에서 안전하고 쾌적하고 위생적인 실내 환경(온․습도, 공기의 질, 소음 등)을 유지할 수 있게 계획한다.

2) 기계·전기실은 에너지 효율을 높이고 관리가 용이하도록 계획하고, 전기실의 경우 유지관리를 위하여 지하수위를 고려하여 가급적 지하층 설치를 지양한다.

3) 기계설비시스템은 에너지의 효율적인 이용방안으로 구역별, 사용별, 시간별로 구분되는 조닝계획이 되어야 하고, 운영시간이 다른 실의 직원이 개별 조작, 제어할 수 있도록 계획되어야 하며, 시설설비 제어 편의성 등을 제공하여야 한다.

4) 자연채광을 최대한으로 활용할 수 있도록 계획하고, 각 실의 용도에 따른 적정 조도를 반영한다.

5) 실내의 공기조화를 용도별 조건에 맞추어 설계하여야 하며, 습기에 의한 피해가 예상되는 각 실은 온도, 습도를 조절할 수 있는 기기를 설치한다.

7) 조경포장 및 조경시설물, 우․오수계획 기타 시설은 친환경적으로 설계한다.

8) 기계환기장치 적용시 소음기준을 준수하고 유지관리측면에서 유리한 제품을 선정한다.

9) 기계설비 배관 등은 가능한 교실 내부로 들어가는 것을 최소화하고, 설치시 유지보수가 가능한 구조로 계획한다.

10) 인접한 공동주택 사이 수목 식재 등을 통해 시각적 차폐계획을 수립한다.

11) 녹지 및 생태공간 등을 충분히 확보하여 학습공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

12) 공용공간 배치 시 일시적 혼잡을 피할 수 있도록 안전한 배치계획을 한다.

※ 2028년 3월 학생배치 예정으로, 예정 공사기간이 20개월정도임을 고려한 설계 실시

1) 타워크레인(이동식) 설치를 고려한 건물 배치계획

2) 콘크리트 타설의 작업공간을 고려하여 건물 배치계획(펌프카 및 레미콘 차량 작업공간 등)

3) 기초공사의 공기단축이 가능한 공법으로 설계 고려

(예시) EPS공법, 온통기초 등 측량 및 타파기, 콘크리트타설 등의 작업기간 고려

4) 지하층의 설계를 지양(에코델타시티의 지리적 특성상 지하수 유입 우려)

5) 건식공법을 적극 활용하여 설계실시

(예시) [내부] 조적벽→경량칸막이벽, 경량콘크리트블럭 / [외부] 치장벽돌, 미장→ 건식판넬

※ 자료로 제공된 (가칭)에코1초등학교 교사신축 사전기획보고서의 내용을 참고하여 계획안은 지침서에 제시된 시설면적기준 및 공사비 내에서 자유롭게 제안 가능하다.

대상지 현황

가. 대지위치: 부산광역시 강서구 강동동 4736-4번지 일원

나. 대지면적: 14,040㎡

다. 지역, 지구: 도시지역, 제2종일반주거지역, 개발행위허가제한지역, 제1종

지구단위계획구역, 학교

※ 에코델타 지역내 지역 지반 참조: 국토교통부 국토지반정보 통합DB센터

(https://www.geoinfo.or.kr/#) → 시추정보 현황 → 사업별 시추공 검색

라. 대상부지 위치 및 현황

◦ 위치도

에코1초

◦ 에코델타 지구단위계획

◦ 현황사진

시설기준표(SPACE PROGRAM)

※ 건축연면적은 초과 불과

※ 단위면적은 기준면적 ±5%이내에서 허용

가. 초등학교 시설기준표

구분	실명	실수	단위실	환산실	면적	비고
일반교실	보통교실	39	1	39	2,555.28	8.4*7.8
	소계	39		39	2,555.28
교과교실	영어실(1)	1	1.5	1.5	98.28
	영어실(2)	1	1	1	65.52
	소계	2		2.5	163.8
특별교실	과학실	2	2	3.5	229.32
	음악실	1	2	2	131.04	시청각실 겸용
	미술실	2	1.75	3.5	229.32
	멀티미디어실	-	2	-	-	도서실 겸용
	컴퓨터실	1	1.5	1.5	98.28
	기술, 가정실	1	2	2	131.04
	소체육실	1	1	1	65.52
	소계	8		13.5	884.52
계		49		55	3,603.6
시청각실		1	2.5	2.5	163.8	음악실 겸용
교사연구 지원시설	교사연구실	6	0.5	3	196.56
	교과전담실	1	0.5	0.5	32.76
	휴게실/갱의실	2	0.5	1	65.52
	체력단련실	1	1	1	65.52
	계	10		5.5	360.36
학생 편의시설	도서실	1	4	4	262.08
	정보자료실	0	0	0	0	도서실 겸용
	학생자치실	-	-	-	-	다목적강당 겸용
	특별활동실	1	1	1	65.52
	탈의실/샤워실	2	0.25	0.5	32.76
	계	4		5.5	360.36
관리실	교장실	1	0.5	0.5	32.76
	교무실	1	1	1	65.52
	행정실	1	0.5	0.5	32.76
	회의실	1	0.5	0.5	32.76
	인쇄실	1	0.5	0.5	32.76
	보건실	1	1	1	65.52
	문서고	1	0.5	0.5	32.76	행정실내 설치
	방송실	1	1	1	65.52
	위클래스	1	1	1	65.52	상담실겸용
	늘봄교실	5	1	5	327.60
	운영관리 (경비)실	1	0.5	0.5	32.76
	학부모운영회실	-	-	-	-	회의실겸용
	전산실	1	0.5	0.5	32.76
	계	16		12.5	819.00
기타시설	창고(목공)	1	0.5	0.5	32.76
	창고(체육)	1	0.5	0.5	32.76
	전기실	1	1.77	1.77	120
	기계실	1	2.96	2.96	200
	계	4	5.73	5.73	385.52
급식실 및 다목적실	급식실	1			295.80	323+0.1 (N-1201)
	다목적실 및 강당	1		20*36	720
	식당	1			600	1인당 1.2㎡/2교대 =0.6㎡/인
	계	3			1,615.80
순면적 계(A)		86			7,308.44
공유면적					4,490.61	화장실,복도, 현관,계단, 휴게코너 등
공유면적 계(B)					4,490.61
합 계(C=A+B)		86			11,799.05
다양한 학습활동공간					728.95	학생수 1,055명
합 계					12,528

서식

1. 건축설계공모 응모신청서         (서식 1)

2. 서약서                          (서식 2)

3. 사전접촉금지 서약서             (서식 3)

4. 공동응모 협정서                 (서식 4)

5. 대표자 선임계                   (서식 5)

6. 건축설계공모 서면질의서         (서식 6)

7. 건축설계공모 제안서             (서식 7)

8. 건축설계공모규정 동의서         (서식 8)

9. 작품활용동의서                  (서식 9)

10. 사용인감계                     (서식 10)

11. 청렴서약서                     (서식 11)

12. 사전접촉여부 확인서            (서식 12)

13. 심사위원 기피․회피 신청서       (서식 13)

14. 추정 예상공사비 개략내역서      (서식 14)

15. 관련법규 검토서                 (서식 15)

16. 설계설명서 및 설계도면 표지     (서식 16)

[서식 1]

건축설계공모 응모신청서
※ 신청번호					응모비율
대 표 건축사사무소	업 체 명 (건축사)		전화번호 (FAX번호)		%
	대 표 자		대표자 휴대전화번호
	소 재 지		E-MAIL
공동응모 건축사사무소	업 체 명 (건축사)		전화번호 (FAX번호)		%
	대 표 자		대표자 휴대전화번호
	소 재 지		E-MAIL
부산광역시교육청에서 주최하는 (가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모에 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청하며, 당선 및 입상작이 되었을 경우 제출한 설계도서, 2차적 저작물 작성권을 포함한 활용 일체를 부산광역시교육청에 양도함을 동의합니다. 첨부: 등록서류 1부(서약서, 사전접촉금지 서약서, 사업자등록증 사본, 건축사면허증 사본, 건축사사무소등록증 사본, 건축사면허수첩 사본, 공동응모협정서, 대표자선임계, 국외건축사자격증 사본) 2025. . . 신청인 : (인) (대표자) 부산광역시교육감 귀하

[서식 2]

서  약  서

본인은 부산광역시교육청에서 시행하는 『(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모』에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정 행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025.   .    .

위 서약자

대표업체	소    재    지 :

업    체    명 :

대  표  이  사 :            (인,  서명)

소    재    지 :

공동수급업체	업    체    명 :

대  표  이  사 :            (인,  서명)

부산광역시교육감 귀하

[서식 3]

사전접촉 금지 서약서

(설계공모 참가자용)

본인은 『(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모』와 관련하여 부산광역시교육청에서 선정한 심사위원 명부를 열람하였으며, 관련 규정에 따라 심사위원 사전접촉 등 불공정행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반할 때에는 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고, 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025.    .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

부산광역시교육감 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 4]

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 『(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모』에 (       )와 (        )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체가 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체를 제외한 공동응모업체의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                        (소재지 :                          대표자 :       )

2. 업체명 :                        (소재지 :                          대표자 :       )

제4조 (공동응모 비율) 공동응모 비율은 다음과 같다.

1. 대표업체명 :                    (응모비율 :           )

2. 공동응모업체명 :                (응모비율 :           )

※ 부산지역업체 공동응모 비율 확인을 위해 건축 설계업체간 응모비율은 제4조 하단에 별도 표기

(건축 설계업체명, 대표자, 공동응모비율 %로 표기)

제5조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동 응모업체의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제6조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종료된다.

제7조 (의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제8조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 주관기관에 서면으로 신고하며, 탈퇴업체를 다른 업체로 교체할 수 없다.

제11조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서(  )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2025.   .   .

○ 대표업체

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

○ 공도응모 업체의 구성원

업  체  명 :                                   (전화번호)

소  재  지 :

대  표  자 :                                   (인)

[서식 5]

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 공동대표로서 부산광역시교육청에서 시행하는  (가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2025.   .   .

대표건축사사무소 사무소명 :

대표건축사  성명 :

공동응모건축사사무소 사무소명 :

대표건축사  성명 :

○○○ 건축사사무소

대표건축사 ○○○

부산광역시교육감 귀하

※ 하나의 건축사사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 건축사사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

[서식 6]

건축설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
건축사 사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호 E-MAIL
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ e-mail 로 제출

[서식 7]

건축설계공모 제안서
신 청 번 호						접 수 번 호
신청인	1) 업 체 명					2) 대 표 자
	3) 주된 사무소 소재지					4) 전화번호 (FAX번호)
	5) 휴대전화번호					6) E-MAIL 주소
위와 같이 『(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모』지침에 따른 제안서를 제출합니다. 2025년 월 일 제 출 자 (인) 부산광역시교육감 귀하
제출도서					구비서류
1. 설계설명서 및 설계도면 14부 (보관용 1부, 심사용 13부) 2. 배치도, 조감도 각 1매 3. CD 또는 DVD 1매					1. 건축설계공모 제안서 2. 건축설계공모규정 동의서 3. 작품활용동의서
---------------------------- (절 취 선) ----------------------------
건축설계공모 제안서 접수증
※ 접수번호							접수인
건축사 사무소명
대 표 자 (건축사)				발주기관

[서식 8]

건축설계공모규정 동의서

본인은 귀 교육청에서 시행하는 『(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모』에 응모함에 있어 귀 교육청의 설계공모지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 교육청의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2025.   .    .

위 서약자

대표업체	소    재    지 :

업    체    명 :

대  표  이  사 :            (인,  서명)

소    재    지 :

공동수급업체	업    체    명 :

대  표  이  사 :            (인,  서명)

부산광역시교육청 건축설계공모 심사위원장 귀하

[서식 9]

작품활용동의서

본사는 부산광역시교육청에서 발주하는 (가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모와 관련하여 제출된 제안도서의 내용을 전시, 출판, 공표하는 경우, 부산광역시교육청이 사용하는 것에 동의합니다.

2025.   .   .

회 사 명 :

대 표 자 :             (인)

주    소 :

연 락 처 :

부산광역시교육청 귀중

[서식 10]

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	∘ 회 사 명 : ∘ 주 소 : ∘ 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 부산광역시교육청에서 시행하는 『(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년   월   일

회사명 :

주  소 :

대표자 :              (인)

부산광역시교육감 귀하

[서식 11]

청  렴  서  약  서

□ 용 역 명 :

□ 발주기관 : 부산광역시교육청(                   )

당사는 『(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 설계공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 당해 설계공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원(대상자 포함)이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2025년   월   일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

부산광역시교육청 건축설계공모 심사위원장 귀하

[서식 12]

사전접촉 여부 확인서

(설계공모 참가자용)

본인은 『(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모』와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 심사위원에 대한 사실여부를 아래와 같이 확인하며, 만일 거짓이 있는 경우 심사대상에서 제외하거나 선정된 입상작에서 취소되는 등의 불이익을 감수하고 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

2025.    .

○ 대표업체 or 건축사		업체명 :
		주 소 :
		대표자 :	(인)
○ 공동응모업체(자)		업체명 :
or 건축사		주 소 :
		대표자 :	(인)

부산광역시교육감 귀하

※ 개인의 경우 업체명 생략 가능

[서식 13]

심사위원 기피․회피 신청서

□ 사 업 명 : (가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

2025년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :              (인)

부산광역시교육청 건축설계공모 심사위원장 귀하

[서식 14]

추정 예상공사비 개략내역서

공사명: 『(가칭)에코1초등학교 교사신축공사』

(단위 : 천원)

구분	공종명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축 공사	소 계
	가설공사
	골조공사
	조적,방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
조경공사
기계설비공사
합 계
제 경 비
폐기물처리비
총 계
부가가치세
총공사금액

[서식 15]

관련법규 검토서

□ 사업명 : 『(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모』

법 규 명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

[서식 16]

설계설명서 표지 양식

(가칭)에코1초등학교 교사신축 건축설계공모 [설계설명서 및 설계도면] 2025. 00. 00.	좌철 평제본 〔글자체〕 -제목 : 굴림체, 굵게(크기36pt) -부제 : 굴림체, 굵게(크기26pt) -날짜 : 굴림체, 굵게(크기24pt) -테두리선은 표기하기 말 것 -지질 : 순백색 스노우지(무광택, 코팅금지)