「제천시 송학면 농촌중심지활성화사업」세부설계용역

제안공모 지침서

2025. 12.

	한국농어촌공사 충북지역본부

차     례

Ⅰ. 사업개요	1

Ⅱ. 건축설계 제안공모 요강	4

Ⅲ. 설계 지침	11

Ⅳ. 설계도서 관련 사항	21

Ⅴ. 심사 관련 사항	25

Ⅵ. 저작권 및 기타사항	36

Ⅶ. 붙임 및 각종서식(붙임 및 별지 1~18)	38

Ⅰ. 사업개요

1. 사업의 목적

○ 건축서비스산업진흥법 제21조 [설계공모의 활성화]에 따라 공공건축의 발전 및 공간문화 창조에 이바지함을 목적으로 함

○ 송학활력공동체센터 신축을 통해 농촌 중심지 활성화 사업, 지역사회와의 소통 공간, 목적에 맞는 규모와 프로그램으로 농어촌의 경제·사회적 발전에 이바지 하는 공간 디자인 방향을 설정하여 주민에게 제공

○ 송학활력공동체센터의 공간효율성 증대와 주민 수요에 맞춰 개선하여 시설 이용의 활성화 도모

2. 사업개요

가. 사업명칭 : 송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역 제안공모

나. 사업개요

구 분	내 용	비 고
위 치	충청북도 제천시 송학면 시곡리 1164-14번지 외 5필지
대지면적	4,809.9㎡ (활력공동체센터 2,800㎡, 활력공동체마당 2,009.9㎡)
지역·지구	계획관리지역, 지구단위계획구역
주 용 도	1종근린생활시설 (주민공동이용시설)
연 면 적	1,099㎡	(연면적 ±5% 범위 내 계획가능)
건 폐 율	법정 : 40% 이하
용 적 률	법정 : 100% 이하
추정공사비	5,642,803,000원	부가세 포함

다. 사업기간 : 2022년~2026년(5개년)

라. 예정공사비(부가세포함) : 5,642,803,000원(부가세포함)

마. 설계용역비(부가세포함) : 287,497,000원(부가세포함)

※ 설계용역범위 : 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 설계 제안에 따라 신축을 위한 기존 건축물 철거범위 및 공사범위 제안 등 제반분야의 설계 및 지질조사비용 등 제반 행정절차 이행과 건축협의, 설계자문, 건축물 발주에 필요한 심의, 계약심사, 손해배상보험료, 건축물 해체계획서 작성 등 발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 등 과업수행에 필요한 일체 용역비 포함 (용역완료시 각종 증빙자료제출).

(지질조사, 측량조사, BF인증 컨설팅 비용 포함)

(단, 예비/본인증 수수료는 발주기관 부담)

(설계의도구현비 별도)

바. 설계공모기간 : 설계공모 공고일부터 공모안 제출 마감일까지 29일간(공휴일 포함)

사. 설계용역기간 : 착수일로부터 ‘26년 9월 30일까지

아. 발주처 : 한국농어촌공사 충북지역본부

- 담당자 : 농어촌계획부 김소이(043-290-3411)

Ⅱ. 건축설계 제안공모 요강

1. 설계공모 방법 및 참가자격

가. 공모방식 : 제안공모

○ 본 용역은 설계자 선정 후 발주처와의 긴밀한 협의를 통해 설계안을 완성해나가는 방식으로 진행될 예정으로, 본 제안공모에서는 완성된 설계안을 요구·평가하는 것이 아니라, 설계자의 경험과 역량, 수행계획 및 방법 등을 기술한 제안서를 종합적으로 평가하여 과업 수행에 적합한 설계자를 선정하기 위함.

나. 참가자격 및 조건

1) 건축사법 제7조에 의한 건축사 면허증을 소지하고, 같은법 제23조에 의거 국토교통부장관에게 건축사사무소의 개설신고를 필한 업체로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

2) 공고일 기준 현재 건축사법 제28조 규정에 의거 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자는 등록할 수 없음

※ 응모신청서 제출 시 건축사협회 및 등록관청에서 발급한 증빙서류 첨부

※ 공모 공고일 기준 3년 이전까지 조회하여 발급한 증빙서류 단, 건축사사무소 최초설립일이 공모 공고일 기준 3년을 초과하지 아니한 경우 최초설립일로부터 조회하여 발급한 증빙서류

3) 결격사유가 없는 참가업체는 공동도급(분담이행방식으로만)이 가능하다.

※ 단, 총 분담업체 수는 5개 업체 이하

4) 설계공모 당선자의 설계용역 계약 시

설계공모 당선자는 용역계약 시와 계약완료시까지 토목, 기계, 전기, 소방, 통신분야 등 관계규정에 따른 설계자격을 보유한 업체와 분담이행방식으로 시행해야 하며, 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 대표자가 되어야 한다. 다만, 당선자가 해당분야 자격요건 충족 시 예외로 한다.

- 토목분야는 엔지니어링 사업자로 등록한 자 또는 기술사법 제6조에 따라 토목구조 또는 토질 및 기초분야의 기술사사무소를 개설한 자가 수행하여야 한다.

- 정보통신 및 기계부문은 「엔지니어링산업진흥법」 제21조의 규정에 의한 정보통신(정보통신), 기계(설비) 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 업체 또는「기술사법」 제6조의 규정에 의한 동 분야의 기술사사무소를 등록한 업체

- 전기분야는 전력기술관리법 제14조에 의한 설계업(전력전문설계1종, 종합설계) 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사사무소(건축전기설비)

- 소방분야는 소방시설공사업법 제4조의 규정에 의하여 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계 및 전기 모두 등록)으로 등록한 업체

2. 설계공모 일정

가. 공모일정

항목	일정	비고
설계공모공고	2025.12.22.(화)	농어촌공사 홈페이지, 나라장터, 세움터 등 게재
참가등록	2025.12.30.(수)	이메일 접수 (2210171@ekr.or.kr)
질의접수	2026.01.02.(금)	이메일 접수 (2210171@ekr.or.kr)
질의회신	2026.01.08.(목)	이메일 회신
설계공모 제안서 제출	2026.01.20.(화) 09:00~16:00까지	등록처 (충북지역본부 3층 농어촌계획부)
제안서 발표 및 심사	2026.01.29.(목) 14:00~	장소(충북지역본부 2층 소회의실) 실시간 시청 링크 게재 예정 (https://www.ekr.or.kr)
심사결과 발표	심사 후 7일 이내	세움터, 당선작 및 입상작 서면통보, 한국농어촌공사 홈페이지 게재
도서반환	당선작 발표 후 7일 이내	입상작(우수작 및 가작포함)은 반환하지 않음

※상기일정 및 장소는 사정에 따라 변경될 수 있음.

나. 일정 등의 변경

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간(09:00~17:00)에 한다.

2) 공모일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 응모신청 시 기재한 팩스 또는E-mail을 통해 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

3. 참가등록

가. 등록기간 : 2025.12.30.(수) 09:00~17:00

나. 접수방법 : 이메일접수(2210171@ekr.or.kr) (담당자: 김소이 043-290-3411)

※ 접수 시 접수 사실을 반드시 담당자에게 확인해야 함

※ 이메일 접수로 접수증 교부는 따로 없음

다. 구비서류 :

번호	구비서류		비고
1	제안공모 응모신청서 1부.	<별지 제1호>
2	건축사면허증 사본 1부.
3	건축사업무신고필증 사본 1부 (법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본)
4	설계공모 참여자명단 1부.	<별지 제2호>
5	청렴서약서 1부.	<별지 제3호>
6	사용인감계 부.	<별지 제4호>	해당시
7	법인등기부 등본 (법인의 경우) 또는 사업자등록증 (개인의 경우) 사본 1부.
8	인감증명서 (법인의 경우 법인 인감) 1부. ※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역 업체의 확인서를 받아 제출
9	행정관청의 처분 여부 확인 증빙서류(공고일을 기준으로 해당 설계사무소의 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지 기타사항 등에 관한 사항) ※ 국토교통부의 경력위탁기관인 건축사협회 등에서 발급한 증빙서류 첨부
10	심사위원 기피·회피 신청서 1부.	<별지 제11호>	해당시
※ 사본은 원본대조필하여 제출

4. 질의접수 및 회신

가. 질의접수일자 : 2026.01.02.(금)  17:00이내 (기한 내 접수된 질의서에 한함)

나. 질의방법 : 이메일접수 [별지 제6호 서식_A4]로 작성한 질의서를 E-mail로 질의

다. 질의접수처 : 2210171@ekr.or.kr (담당자 : 김소이 043-290-3411)

※ 질의접수 시 접수 사실을 반드시 담당자에게 확인해야 함

라. 유의사항

1) 질의서는 기간 내에 접수해야 하며 참가자 (업체)별로 1회에 한한다.

2) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성해야 한다.

마. 질의회신 : 2026.01.08.(목) (발주기관 사정에 의해 변경될 시 별도 공지)

1) 응답방법 : 이메일회신(참가등록자 전원에게 신청서에 작성된 이메일로 개별통지)

2) 유의사항

가) 질의사항에 대한 한국농어촌공사의 답변 내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

나) 질의서 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적 사항 등 질의서 상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니 할 수 있다.

다) 질의 기간 외 질의사항에 대하여는 답변하지 않는다.

라) 질의내용에 따라 상부기관의 유권해석 등 추가검토가 필요한 경우 회신기한이 연기 될 수 있다. (질의회신 기한이 지연될 경우 별도 공지)

마) 추가 공지 및 정정사항이 있을 시 이메일로 개별통지하며, 별도의 전화 안내는 없음.

5. 설계공모 제안서 제출

가. 제출기간 :  2026.01.20.(화)  09:00~16:00

나. 제출방법 : 직접 방문제출

다. 제출장소 : 한국농어촌공사 충북지역본부 3층 농어촌계획부

(충청북도 청주시 서원구 1순환로 1053)

라. 유의사항

1) 제출서류는 명시된 마감시간 전까지 직접 제출하고 접수증을 교부받아야 한다.(우편제출 등은 허용하지 않음)

2) 응모자는 1개의 응모안 만을 제출할 수 있다.

3) 접수된 응모작을 수정ㆍ변경ㆍ보완할 수 없으며, 추가 제출할 수 없다.

4) 심사용과 보관용 제출도서는 각각 하나의 묶음으로 파손되지 않도록 포장 후 겉포장에 제출 도서 제목 및 심사용, 보관용을 구분해 표기하며, 모든 도서류에는 규정에 의한 것 이외의 표시를 금한다.

5) 대리인 제출 시 신분증 지참 및 대리인위임장, 재직증명서를 첨부한다

마. 제출서류

1) ‘설계공모 제안서 제출서’ <별지 제7호 서식_A4> 1부

2) ‘설계공모 제안서’ 8부 (심사용 : 7부 / 보관용 : 1부)

3) ‘담당건축사 경력 및 실적’ <별지 제8호 서식_A4> 1부 (실적관리 수탁기관 또는 발주기관의 경력증명서 및 실적증명서 포함)

4)  발표 자료(심사용 제안서가 발표자료, PDF 포맷)

5)  위 1)~4)  내용을 저장한 USB 1매 (저장형식 : PDF)

※ 제출서류 이외의 서류는 접수받지 않는다.

※ 제안서 파일 용량 : 제안서 접수가 5개 업체 초과하는 경우, 심사를 2차로 나누어 진행한다. 이 경우 1차 심사는 심사위원에게 이메일로 제안서를 배부하여 진행한다. 제안서 파일용량을 크게 할 경우 PDF파일 전송이 어렵고 발표 시 페이지가 잘 넘어가지 않으므로 반드시 용량을 확인해야 된다. 용량 기준을 지키지 않아 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다. (50MB 이하 권고)

USB 폴더 정리 예시

6. 제안서 발표 및 심사

가. 설계공모 제안서 심사

1) 일시 :  2026.01.29.(목)  14:00~

2) 장소 : 한국농어촌공사 충북지역본부 2층 소회의실

(충청북도 청주시 서원구 1순환로 1053)

3) 심사방법 : 심사는 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 의결을 거쳐 채점제 또는 투표·채점 혼합방식 가능

※ 투표제 진행 시, 발주처 정량평가를 참고자료로 제공

※ 응모자가 5개 업체 초과하는 경우, 심사를 2단계로 나누어 진행

(1차 심사는 이메일로 제안서 배부하여 투표제를 통해 5개 업체 선별한 후,

2차 심사는 1차 통과업체에 한해 제안서 발표와 질의답변을 진행)

<2단계 작품심사>

① 효율적인 심사를 위해 제출된 제안서가 5개 초과인 경우 2단계를 나누어 심사를 진행하며, 1단계 심사를 거쳐 5개의 제안서를 선정 후 2단계(최종) 심사를 진행함.

② 1단계 투표 결과, 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있을 경우, 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 1단계 심사 통과자를 결정한다. 다만, 재투표를 1회 실시한 후에도 결정이 되지 않을 때는 동일 득표자는 모두 2단계 (최종)심사를 진행함

③ 1단계 및 2단계 심사는 제출된 동일한 제안서를 바탕으로 심사

(가) 1단계 심사(심사위원회 미소집)

(1) 심사방법 : 제출된 제안서(순서 무작위)를 각 심사위원이 사전검토 후 투표를 실시하여 심사위원의 각자 득표수를 합산하여 득표수에 따라 5개 제안서 선정

※ 동점자 발생 시 재투표를 실시하여 득표수가 많은 자를 선정

※ 접수 작품 수에 따라 탈락업체 선정 투표를 할 수 있음

(2) 평가기준 : [지침서 29p – 3. 심사 채점기준 – 가.투표제 – 1)평가주안점] 기준으로 투표

(3) 심사기간 : 심사위원에 제안서 배부(접수후 1~2일 이내) 후 6일 이내

(4) 결과통지 : (최종)심사 전 모든 제안서 제출 업체에게 심사결과 통지

※ 1단계 심사의 평가사유서 등은 생략함

※ 심사위원장 호선 전으로 1단계 심사의 의결 및 결과통보는 발주처가 시행

(나) 2단계 심사(심사위원회 소집)

(1) 심사방법 : 1단계 심사에 통과된 업체만 발표를 통해 진행

(2) 평가기준 : 심사는 투표제가 원칙이며, 심사위원회 의결을 통해, 투표제+채점제, 채점제로 조정 가능

4) 심사순서 : 심사 당일 추첨

※ 심사 일정 및 장소는 변경될 수 있으며, 변경될 경우 별도 통보

나. 제안서 내용 발표

1) 발표자 : 담당 건축사(신분증, 접수증 확인)

※ 발표자가 제안서 제출 시 기입·제출된 서류의 담당 건축사와 다른 경우, 발표 당일 접수증, 신분증, 대리인위임장, 재직증명서, 건축사면허증 모두 제출 시 발표가 가능하다.

※ 발표자가 변경되어도, 발주처 정량평가는 제안서 제출 시 기입·제출된 서류의 담당 건축사의 경력 및 실적으로 반영한다.

2) 발표내용

- 제안서 발표는 제출된 ‘2-1. 설계공모 제안서(심사용)’ = ‘발표자료’를 사용한다.

- 발표시간 10분 / 질의답변 10분

- 발표 순서는 심사당일 추첨을 통해 선정한다.(제안서 제출순서로 추첨)

- 제안서 발표 및 질의답변은 발표자만(담당 건축사) 답할 수 있다.

다. 심사위원회 공개

1) 정보통신 매체 등을 통해 실시간으로 공개

2) 심사의 공정성을 위해 대기자는 실시간으로 공개되는 제안서 발표 및 심사 시청 금지

3) 심사당일 공사 홈페이지(https://www.ekr.or.kr)에 실시간 시청 링크 게재 예정

7. 심사결과 발표 및 당선작 통보

가. 일시 : 제안서 심사 종료 후 7일 이내

나. 발표방법 : 당선자 및 입상작 서면통보, 한국농어촌공사 홈페이지, 조달청, 세움터 게재

8. 입상작품 및 보상비

가. 보상비 예산 : 10,000천원 (설계비 추정가격의 5% 이내, 1천만원 이내)

나. 입상작은 제안서 제출 수에 따라 선정하며, 당선작은 별도의 보상비를 받지 아니한다.

다. 입상작에 대한 보상은 아래와 같다.

접수 작품 수	순위	자격	보상금
18개 이상	1	당선작	설계권 부여
	2	우수작	4,000천원 (보상예산의4/10)
	3	가작	3,000천원 (보상예산의3/10)
	4	가작	2,000천원 (보상예산의2/10)
	5	가작	1,000천원 (보상예산의1/10)
17개 이하	1	당선작	설계권 부여
	2	우수작	4,000천원 (보상예산의4/10)
	3	가작	3,000천원 (보상예산의3/10)
	4	가작	2,000천원 (보상예산의2/10)
11개 이하	1	당선작	설계권 부여
	2	우수작	4,000천원 (보상예산의4/10)
	3	가작	3,000천원 (보상예산의3/10)
7개 이하	1	당선작	설계권 부여
	2	우수작	3,333천원 (보상예산의1/3)
※ 해당 설계공모의 목적과 내용에 적합한 당선작이 없다고 심사위원회에서 결정한 경우에는 당선작 없이 그 밖의 입상작만을 선정할 수 있음 ※ 공모비용의 보상은 공공건축 설계발주 가이드 참조

9. 기타

가. 공고(안)에 대한 자세한 사항은 ‘설계공모 지침서’를 참조하고, 반드시 이를 숙지하고 준수하여야 하며, 일정은 변경될 수 있다.

나. 응모자가 2개 업체 미만인 경우 재공고를 하며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 「건축 설계공모 운영지침」에 따라 한국농어촌공사에서 결정하여 진행한다.

다. 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

라. 본 지침서의 해석이 응모자 간 다를 경우, 발주처의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주처가 정하는 바에 따라야 한다.

마. 당선자로 선정되어 용역수행 시 제출된 과업수행계획서에 기재된 참여 기술자는 발주기관의 승인 없이 임의 교체할 수 없다.

바. 입찰보증금은 없으며, 제출도서 작성기준 및 법규위반을 하였을 경우 심사위원회 의결을 통해 실격 또는 불이익 있다.

사. 기타 계약에 관한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 의한 법률」을 따른다.

아. 본 공고에 관한 궁금한 사항은 한국농어촌공사 충북지역본부 농어촌계획부 김소이(043-290-3411)로 문의

Ⅲ. 설계 지침

1. 계획개요

○ 설 계 명 : 송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역

○ 위    치 : 제천시 송학면 시곡리 1164-14번지 외 5필지

○ 대지면적 : 4,809.9㎡(활력공동체센터 2,800㎡, 활력공동체마당 2,009.9㎡)

○ 지역지구 : 계획관리지역, 지구단위계획구역

○ 건축제한 : 건폐율 40%, 용적률 100%

○ 규모 및 구조

- 주 용 도 : 1종근린생활시설

- 전체 연면적 : 1,099㎡(지상층 연면적: 1,099㎡)

구 분	층 수	연면적	구 조	주차대수	비 고
송학 활력공동체센터	지하0층/지상2층	1,099㎡	철근콘크리트	20대 (법정5대이상)

※ 연면적은 ±5% 범위에서 증감 가능

※ 층수는 건축제한 범위 내에서 자유롭게 계획 가능

- 규    모 : 건물특성을 제고한 적정규모 채택

- 용 적 률 : 법적 용적률 규모 이하

- 계획주차대수 : 법정 5대 이상

※ 장애인전용주차구역, 환경친화적자동차 전용주차구역 및 충전시설, 자전거주차장 등 관련 법정 대수 이상 반영 필수

- 냉ㆍ난방 : 건물특성을 고려한 열원방식 채택

- 구    조 : 건물특성을 반영한 구조형식 채택

2. 부문별 설계지침

가. 기본방향

○ 지역 맞춤형·생활밀착형 복지 문화 복합서비스 공간 조성

- 인근시설의 문화·교육·복지 기능을 접목하고 송학면의 발전과 지역사회 활력을 위해 지역주민 모두 함께 사용하는 거점시설을 마련함

- 노인, 아동 및 청소년층, 청·장년층 등 지역주민의 사회활동 참여 독려 및 교류와 소통의 공간 조성을 통한 정보 습득과 문화·복지 교류 추진함

○ 주민 친화형 공간구성의 특성화

- 공간 및 기능 특성에 따른 다양한 형태의 커뮤니티 공간 조성계획을 수립함

- 주민 친화적인 공간구상을 계획하여 남녀노소 누구나 휴식하고 소통할 수 있는 편의공간을 확보할 수 있도록 함

- 송학면 중심지와 배후마을 주민도 함께 참여하고 활동할 수 있는 프로그램으로 계획함

○ 송학면 중심거점 기능 강화를 위한 커뮤니티센터 조성

- 기존 생활 서비스 기능시설의 이용한계를 진단하고 송학면 주민들의 공동체를 육성하고 기초생활 서비스 확충을 위한 주민수요형 커뮤니티센터 조성계획을 수립함

- 농촌 공공공간의 개방, 공유, 연계를 통해 ‘문화 + 복지 + 교육’ 분야 관련시설을 단지화를 통해 기본적인 사회서비스 및 주민편의 서비스를 제공함

- 효율적인 토지이용, 주민 편리성, 중심기능시설 밀집 지역 등 대상지의 특성을 고려하여 주변 거점시설과의 상호연계 이용을 극대화할 수 있는 공간으로 배치계획함

- 건축물은 각 공간에 독자적인 기능을 수행함과 동시에 연계성을 유지할 수 있도록 유기적인 관계를 고려한 건축 계획을 수립함

- 단순한 물리적인 건축물이 아닌 공동체 거점 역할을 담당하고, 송학면 지역민들의 자긍심을 심어줄 수 있는 중심공간으로 가능성을 부여함

- 외부공간은 중심지, 배후마을 주민 등 이용객의 편의를 위한 주차 공간 및 다목적 광장으로 활용할 수 있도록 계획함

나. 일반사항

○ 대지조건을 활용하여 채광 및 개방감을 확보하는 형태로 배치하며, 외부 조경공간과 물리적·시각적·사회적으로 유기적 상호 작용이 가능하도록 건물과 공간을 배치함

○ 인근시설 기능과 연계할 수 있는 건축물 배치를 계획하였으며, 지역의 상징성을 갖고 주변 공원과 지역자원을 고려하여 계획을 수립함

○ 송학 활력공동체센터는 기존 생활SOC시설과 같이 특정 기능 및 대상을 위해 운영되는 시설이 아닌, 복지·문화·교육 등 다양한 생활서비스를 통합하여 제공하는 거점시설로 복합적인 수요에 따라 상이한 목적성을 가진 다양한 이용객이 방문할 것이며, 수요에 따른 실별 접근성과 마찰을 고려한 평면계획을 수립함

○ 지역공동체의 중심 거점으로서 중심지 및 배후지역 주민들이 상호보완적인 공동체 활동과 소통을 영위할 수 있는 공간으로 계획함

○ 『건축법』, 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』, 『도시공원법』, 『주차장법』, 해당 지자체조례 및 지침 등 관계법령에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하게 설계

○ 건축물에너지효율등급(1++등급 이상) 및 제로에너지건축물 예비인증(5등급 이상)을 받을 수 있도록 분야별 설계요소 반영하여 계획

○ 『공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정』(산업통상자원부 고시), 『건축물의 에너지절약 설계기준』(국토교통부 고시)에 부합하도록 설계하며, 『신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법』에 의해 신재생에너지 공급 의무 비율을 34% 이상으로 계획

○ 『장애인·노인·임산부 등 편의증진보장에 관한 법률』에 따른 ‘장애물 없는 생활환경인증’ 우수등급을 받을 수 있도록 설계

○ 지침에 명시되지 않는 시설 중 필요하다고 판단된 시설은 계획에 반영

○ 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성 있도록 계획

다. 계획지침

1) 건축계획

- 송학 활력공동체센터의 이용성, 경관적 향상을 도모하며 시설 이용 안전성 확보 및 공간의 효율적·다목적으로 하도록 권장함

- 지역 특성에 부합하며 건축물의 외관 및 공간별 특성(진입 공간, 경계부 공간, 옥상공간)을 고려하여 유지관리가 용이한 재료를 선정하여 계획함

가)  배치계획

① 건축물의 활용도, 연계성을 고려하여 주민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 편의성과 공공성을 고려하여 배치 고려

② 활력공동체센터 특성에 맞게 기능성과 효율성이 뛰어나도록 배치하고 주변 환경과 조화를 이루도록 함

③ 도로 등 주변 소음원으로부터의 방음 대책을 검토하여 설계 반영.

나) 평면계획 (실 면적 참고자료로만 활용)

① 각 실별 규모는 사업규모를 참고하여 발주부서와 협의 설계자가 유사시설물의 사례 등을 조사하여 적정규모를 결정하고 이용자의 측면에서 유용성, 편리성을 최우선으로 고려

② 각 실의 연계성 및 다양성을 고려하고 운영자의 관리가 용이하도록 실배치를 고려하고, 각 층별, 실별 동선의 혼란이 없도록 계획.

③ 내부공간, 주변 공간은 다목적 활용이 가능한 공간계획이 될 수 있도록 설계.

④ 엘리베이터는 「승강기시설 안전관리법」 규정에 적합하게 설치하고 이용자의 수직 이동에 충분한 용량으로 설계하여야 하며, 장애인의 사용에 불편이 없도록 함.

⑤ 공간의 가변성을 확보하고, 확장 및 변화 가능성을 고려하여 수평, 수직 증축이 용이한 디자인 및 내부평면 계획을 수립한다.

⑥ 재난 발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 단순하고 명쾌한 내·외부 동선계획을 제시한다.

⑦ 주출입구 및 홀은 다양한 프로그램(안내, 게시, 대기 등)을 수용할 수 있도록 다용도 공간으로 계획하며, 외부공간과 연계될 수 있도록 설계한다.

⑧ 건축물 출입구는 차량, 보행동선 체계 및 부지레벨을 고려하여 합리적이고 경제적인 동선 계획을 수립한다.

⑨ 차량 진출입로 및 보행자 주출입구는 도로 현황 및 주변을 고려하여 계획

⑩ 주차의 진출입로는 인접 주거지 등의 도로 및 교통여건을 충실히 반영할 것

⑪ 보차분리를 명확히 하여 보행자의 안전을 최우선적으로 확보할 수 있게 계획을 수립할 것

⑫ 시설 내부와 연계된 외부공간은 일조 및 채광을 고려하여 부지 남쪽에 배치할 것을 권장

⑬ 내부공간구성은 실용성 있게 배치하고, 특히 에너지절약 등 유지관리에 용이하게 구성할 것

⑭ 기본계획에 반영된 계층별(노년층, 청소년, 다문화 등) 공간영역에 대한 조닝계획을 명확히 하는 한편, 필요시 각 공간영역의 연계 및 활용방안을 추가적으로 제시할 것

⑮ 각 공간 영역별로 기자재 수납을 위한 창고 공간 등을 추가적으로 제시하여 실질적인 공간쓰임새를 고려할 것

⑯ 다양한 연령 및 계층이 함께 사용하는 공간이므로 사회적 약자들이 편하게 사용할 수 있도록 베리어 프리(Barrior-free) 공간을 구현할 것.

송학활력공동체센터

구 분	세부시설		특이사항	면 적		비 율
지상 1층	다목적활력공동체실			201.6	㎡	18.34	%
	활력카페			48.0	㎡	4.37	%
	행복드림삘래방			31.60	㎡	2.87	%
	운영사무실			23.76	㎡	2.16	%
	창고(보관실)			12.8	㎡	1.16	%
	창고			36.0	㎡	3.28	%
	화장실			55.18	㎡	5.02	%
	소 계			408.94	㎡	37.2	%
지상 2층	활력프로그램실-1			33.0	㎡	3.0	%
	활력프로그램실-2			33.0	㎡	3.0	%
	활력프로그램실-3			47.56	㎡	4.33	%
	활력동아리실-1			47.52	㎡	4.32	%
	활력동아리실-2			47.52	㎡	4.32	%
	활력동아리실-3			47.52	㎡	4.32	%
	활력행복이음실			19.80	㎡	1.80	%
	화장실			55.18	㎡	5.02	%
	휴게데크		면적제외	35.28	㎡	-	%
	옥상정원		면적제외	91.66	㎡	-	%
	소 계			331.1	㎡	30.11	%
공용면적	1층	홀,복도,계단실 외		190.82	㎡	17.36	%
		장애인용 ELEV	면적제외	10.26	㎡	-	%
	2층	홀,복도,계단실 외		168.34	㎡	15.31	%
		장애인용 ELEV	면적제외	10.26	㎡	-	%
	소 계			359.16	㎡	32.67	%
합 계(연면적)			1099.20		㎡	100	%

※ 상기 층별 공간 배치 구성 및 면적은 참고사항으로, 설계자의 의도 및 계획에 따라 기능성과 합리성을 감안하여 소요실 및 공용공간의 위치, 면적 등 조정 가능

※ 해당시설물은 BF인증(장애물 없는 생활환경 인증) 대상이므로 감안하여 설계 요망

다) 입면계획

① 밝고 부드러운 소재 및 색채를 사용하여 이용자들이 편안함을 느끼게 하고 사후관리가 손쉬운 자재 이용 권장.

② 자연채광, 환기, 조망을 충분히 고려하여 경제적이고 유지관리가 용이한 재료 및 시스템을 적용한다.

③ 진입도로에서 공공건축물로서의 인지성이 확보되고 친근한 파사드와 호감을 줄 수 있는 세련되고 상징성 있는 외관을 계획한다.

④ 신재생에너지 공급을 위한 태양광패널 설치 시, 태양광패널과 건축물 입면이 조화를 이루도록 계획한다.

라) 단면계획

① 실의 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간이 되도록 계획한다.

② 각 부서별 업무특성을 고려하여 효율적인 수직 조닝계획이 되도록 한다.

③ 누수 차단을 위해 가급적 평슬라브지붕 계획을 자제하며, 누수, 침수 등을 고려한 단면계획을 수립한다.

마) 구조계획

① 구조설계는 『건축구조설계기준』에 의거하여 수행하고, 이외의 기준적용 시에는 반드시 관련 기준을 명시한다.

② 장래의 증축 및 용도변경이나 리모델링 가능성 등을 고려하여 계획한다.

③ 건축 구조 뿐만 아니라 건축설비(전기설비, 기계설비) 및 건축 비(非)구조부재에 대한 내진설계를 하여 건축물의 안전성을 확보하며, 이외에 면진설계 등 최신의 설계기법 적용을 검토하고 경제성이 반영된 최적의 구조시스템으로 계획한다.

④ 동절기, 간절기 콘크리트 강도할증에 대한 표준시방서 확인 후 반영

2) 건축기계설비 계획

가) 건축물의 사용 목적을 충분히 파악하고, 「기계설비법」 및 「기계설비 유지관리기준」 등 관련법령을 반영하여 설계하여야 한다.

나) 환경친화형(Green Building System) 적용 및 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위한 각종 환경조절(제어)시스템과 최적 설비 시스템을 제안하여야 한다.

다) 「건축물의 에너지 절약 설계기준」(국토교통부 고시),「고효율 에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정」(산업통상자원부고시), 「공공기관 에너지 이용합리화 추진에 관한규정」(산업통사자원부 고시), 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」등 에너지 절약 관련 사항을 적극 수용하여 에너지절약 및 친환경적 건축물로 계획하여야 한다.

(고시 및 기준 등은 최신자료를 적용한다)

라) 주변 자연조건들을 활용한 에너지 절감 계획을 검토하여야 한다.

마) 적용 가능한 신․재생에너지설비(태양열, 지열시스템 등)를 도입하여 계획하여야 한다.

바) 방재설비는 건축, 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어할 수 있는 시스템으로 계획하여야 한다.

사) 소방설비는 관련 법규를 만족시킬 수 있도록 하고 인명의 안전과 경제성을 고려하며, 증설에 따른 소화시설 대응이 용이하도록 계획하여야 한다.

3) 전기분야 계획

가) 전기, 통신 및 제어설비는 IBS화 하여 최적의 시스템을 구성하고 안전성, 신뢰성, 기능성, 경제성 등에 중점을 두어 유지관리를 일원화한 통합시설관리시스템을 적용하여야 한다.

나) 공공기관 에너지이용합리화 추진지침, 건축물의 에너지 절약 설계기준, 고효율 에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법등 에너지 절약 관련사항을 적극 수용하여 환경 친화적 건물로 계획한다.

다) 건물의 Life Cycle을 고려하여 첨단기기의 발달에 따른 변화에 적극 대응할 수 있는 전기설비가 되도록 설계하여야 한다.

라) 전력시스템 계획은 경제적이면서 유지보수가 편리하며 에너지절감이 이루어지도록 계획한다.

4) 정보통신분야 계획

가) 정보통신설비는 초고속 정보통신건물 인증 및 사무자동화, 건물자동화 등 각 IBS를 수용할 수 있도록 하고, 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조변경 없이 설치 가능하도록 계획한다.

나) 센터의 업무망, 인터넷망 구축 및 건물의 기능에 적합한 통신 및 네트워크를 종합적으로 고려하여 계획하고 각 기능별, 실별 기능에 부합하는 정보통신 및 전산부문의 수용에 충분한 통신회선을 구성하여야 한다.

다) 통신설비의 유지보수에 지장이 없도록 계획되어야 하며, 통신설비를 지원하는 건축(구조포함), 기계설비, 전기설비 등은 긴밀한 협의를 통해 기기배치 및 설치에 문제가 없도록 하여야 한다.

5) 조경분야 계획

가) 효율적인 대지의 이용 및 개방감을 확보하도록 하고 양호한 경관 형성에 노력한다.

나) 차량 진출입부는 인지성을 고려하여 계획하고, 차량 진출입 통로폭은 충분히 확보하도록 한다.

다) 부지의 이용을 극대화하여 용도 및 지역의 필요성에 따라 적절히 넓은 주차공간, 녹지공간의 확보에 노력한다. 또한 향후 증축 및 휴식공간 등에 관해서도 충분히 고려한다.

라) 이용자 편의 증진과 쾌적한 시설이용을 위한 외부공간 계획(주차공간, 휴게공간, 조경, 옥외운동공간 등)을 구체화하여 종류 및 필요 규모를 제시한다.

마) 부지 내 순환이 가능한 전체대지 보행 및 차량동선을 계획한다.

바) 보행동선과 차량동선을 명확히 구분하여 보행자의 안전을 확보하도록 계획한다.

사) 장애인 주차장은 장애인의 접근, 이용, 이동편의를 충분히 확보하도록 계획한다.

아) 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선계획을 수립한다.

자) 주차계획 시 「주차장법 시행규칙」에 따른 주차규격을 적용한다.

차) 자전거 및 이륜차(오토바이) 이용자를 고려한 보관소 및 주차공간을 확보한다.

카) 친환경 포장재 선정 등 환경친화적 주차공간 조성계획을 수립한다.

타) 주차장 내 보행자 안전을 고려한 보행자 통로 및 유도표시를 계획한다.

파) 원활한 차량 진출입을 위해 민원인 주차 동선과 직원 주차 동선을 분리하여 효율적인 주차계획을 수립한다.

6) 토목분야 계획

가) 부지정지시 발생되는 절․성토 사면에 대하여서는 친환경적인 생태복원을 하도록 하여야 하며 사면부의 안정성 검토를 하여 적정 사면 구배를 적용하도록 한다.

나) 토목계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설의 효용성 극대화와 자연환경의 보존 및 경제성을 고려하여 계획한다.

다) 도로 및 보도의 포장은 친환경성, 안전성, 시공성, 경제성, 유지관리, 사용자의 편의성 등을 고려하여 적정 포장재를 선정하도록 하며, 포장단면은 동결지수, 교통량, 토질조건 등을 고려하여 계획한다.

라) 건축설계공모 당선자(계약자)는 공사부지 현황에 대한 기본조사, 측량 및 지반조사를 계획ㆍ중간ㆍ실시 설계시 수행한다.

7) 기타 지침

가) 부지의 환경조건, 시설물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 열손실 방지 등 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

나) 시설물의 사용연한 내 그 기능이 확보될 수 있도록 건축구조, 설비 및 건축구조 부재의 합리적인 내구성의 향상에 노력한다.

다) 시설물의 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시하여야 하며, 사후 유지관리 등의 경제성이 비교․검토되어야 한다.

라) 건축물 내․외부 색채계획은 주변환경과 조화를 이룰 수 있도록 한다.

3. 토지조서

번호	시	면	리	지번	지목	공부면적 (㎡)	편입면적 (㎡)	용도지역
계	6필지					4,809.9	4,809.9
1	제천	송학	시곡	1449-11	학	52	52	계획관리지역, 지구단위계획구역
2	제천	송학	시곡	1164-14	학	2,698	2,698
3	제천	송학	시곡	1164-15	대	50	50
4	제천	송학	시곡	1506	잡	648.2	648.2
5	제천	송학	시곡	1507	공	672.5	672.5
6	제천	송학	시곡	1508	잡	689.2	689.2

4. 유의사항

가) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

나) 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

다) 설계공모지침서 및 과업지시서 등을 준수하여야 한다.

Ⅳ. 설계도서 관련사항

도서작성

가. 제안공모 제출서류에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다. (응모자 임의의 고유번호도 표시하지 아니함, 보관용 설계공모 제안서는 제외)

나. 익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정까지 전 기간 동안 적용된다.

다. 상기사항을 위반할 경우 심사위원회의 의결을 통하여 불이익 또는 실격 처리할 수 있다.

라. 설계공모 심사 전까지 심사위원을 개별로 접촉하여 사전 작품설명을 하여서는 아니되며, 심사 전·후 상기에 해당하는 사실이 발각될 경우 이 지침에 정하는 모든 자격을 박탈한다.

마. 제안서 표지에는 아래와 같이 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측 상단에 흑색으로 표시해야 한다.

2. 작성방법

가. 공통사항

1) 축척과 방위는 각 도면 좌측상단에 정확히 표현한다.

2) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법을 사용한다.

다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우에는 한글과 병기한다.

3) 모든 제출도서의 종이는 백색용지로 통일하여 사용한다.

4) 제본 시 스프링, 클립 등은 사용이 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

5) 제안서 8부 중 1부는 표지에만 건축사사무소명과 대표자 성명을 기재 또는 날인하고, 심사용 7부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

6) 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 스터디 모델 수준의 모형사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등은 추가할 수 있다.

※ 필요한 경우 스케치업 모델링을 활용한 3차원 이미지 및 다이어그램은 사용할 수 있으며, 매스(mass) 표현 이외에 외벽재료 표현, 음영, 색채, 창문, 나무, 사람, 재질, 장식 등 세부적인 표현도 가능하다.

나. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

순서	항목	세부사항	쪽수
1	표지	앞면, 뒷면(내용없음)	2쪽
2	목차		1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	○담당건축사의 대표작품 포트폴리오 (2작품)	2쪽
4	수행계획 및 방법	○업무에 대한 이해도	1쪽	8쪽
5		○과제에 대한 기술제안(3개 과제)	각 2쪽 (총 6쪽)
6		○수행계획	1쪽
합계			총 13쪽

1) 설계공모 제안서 구성

※ 모든 페이지는 단면인쇄 함, 표지, 목차도 제안서 총 쪽수에 포함된다.

2) 제안서 작성

구 분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법, 표지, 목차
용지크기		A3(횡)	A3(횡)
여 백		- 상 30mm, 하 25mm - 좌 · 우 20mm	- 상 30mm, 하 25mm - 좌 · 우 20mm
글 자 체		자 율	함초롱바탕
글자크기		자 율	- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 10포인트 미만 사용불가 (내부샵도 글자크기 제외)
도표. 이미지		자 율	자 율
줄 간 격		자 율	자 율
분 량		2쪽	11쪽
재 질	표 지	- 흰색 스노우지(무광택), A3(횡), 단면인쇄 ※ 용지무게 : 200g/㎡
	본 문	- 모조지(백상지), 칼라 가능, 단면인쇄 ※ 용지무게 : 100g/㎡	- 모조지(백상지), 칼라 가능, 단면인쇄 ※ 용지무게 : 100g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)	A3(횡) 좌철(무사무선철)
제본내용 및 순서		- 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 2점	- 업무에 대한 이해도 - 과제에 대한 기술제안 - 수행계획

용지 및 기본설정

다. 수행 계획 및 방법 제안과제

1) 업무에 대한 이해도 (A3 1쪽)

- 사업부지, 주변 환경을 분석하여 지역적 특성, 이용자의 특성 및 시설 성격을 감안한 설계 주안점 제시(과제에 대한 기술제안 내용은 제외)

- 대지여건에 따른 설계, 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점 도출 및 이에 대한 개선방안 제시

2) 과제에 대한 기술제안 (A3, 각 과제별 2쪽, 총 6쪽)

[과제 1] 사업부지의 현장여건, 주변 건물과의 조화, 경관 등을 고려한 건축물 배치 및 외부공간개념 제안

- 주변 기반시설, 구조물 등을 고려한 진․출입구, 보행동선, 외부공간 조성방안

- 시설 접근 편의성을 높이는 보차 동선계획과 보행환경 계획

- 외부공간을 최소화하여 건축규모를 최대한 확보하는 방안(예산을 고려한 설계안 제시)

[과제 2] 기능을 고려한 층별 조닝개념, 동선 개념 제안

용도 및 이용대상을 고려한 기능을 고려한 조닝 개념

지역주민, 노인, 어린이 등 다양한 이용자가 많이 이용하는 조닝 개념

[과제 3] 에너지 절약 건축물 구현 및 친환경 건축 계획 개념 제안

- 에너지 절약 방안과 채광, 통풍, 환기 등을 고려한 패시브 디자인 개념

- 시공, 유지관리의 효율성 제고 방안, 에너지절감을 위한 설계 방안

- 활용성 및 기능성 향상을 위한 용도․구조․디자인․규모 관련 자유 제안사항

3) 수행계획 (A3 1쪽)

가) 설계 기간 및 설계 업무상 중점사항 등을 반영한 설계 일정계획

- 수행해야 할 업무(각종 인증·심사·심의·인허가·검토·자문·평가 등 절차 포함)의 범위와 내용을 단계별로 분할 후, 단계별 작업계획 및 작업방법 제시

나) 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시

- 관련분야 전문가(구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 토목 등)와 외부 전문가 구성계획 및 운영 방안

- 업무 추진현황 보고 및 협의 등 발주처와 긴밀한 협업계획

다) 효율적인 사후설계관리 업무 계획

- 설계내용 해석‧자문 등 시공과정의 설계자 참여 방안 등 추진계획 제시(건축서비스산업 진흥법 제22조 “설계의도 구현” 업무 관련)

Ⅴ. 심사 관련 사항

1. 제안서 심사

가. 심사위원 구성 및 운영

1) 심사위원회 운영은 「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제17조  「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호)에 따른다.

2) 심사위원회는 아래와 같이 발주청이 임명 또는 위촉하는 심사위원으로 구성하고 제안공모 작품을 심사한다.

심 사 위 원 명 단
연번	구분	성명	소속	비고
1	외부위원	김인호	조선대학교	※심사위원은 시행방침(일상감사)을 득한 후 추첨된 순서에 따라 구성 ※추첨된 순서에 따라 구성하되, 소속기관 기준으로 동일 지역(도 단위) 2명까지만 선출하며, 이후는 타 지역(도 단위) 선출하여 구성
2		김성원	전라북도청
3		최성우	강원대학교
4		김정범	경동대학교
5		김소희	영남대학교
6	예비위원	신지욱	경상대학교

※ 단, 심사위원 사정으로 불참이 예상될 시 예비심사위원으로 대체하여 심사 전 공개

3) 심사위원은 공정하고 투명한 심사를 위해 심사위원으로 선정될 시 사전 접촉 금지 서약서를 제출하고, 작품심사 당일 사전접촉 여부 확인서를 제출하여야 한다.

4) 심사위원회는 위원장은 위원회를 대표하여 직무를 통할하고, 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있으면 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

5) 설계공모 작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우 그 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성하여야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

6) 심사위원장은 심사위원회의 동의를 얻어 설계공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

6) 작품선정을 위한 심사위원회의 진행은 공개를 원칙으로 한다.

7) 설계공모 참가자는 심사의 공정하게 하기 어려운 사정이 있는 심사위원이 있으면 그 사유를 명확히 하여 서면으로 해당 심사위원의 기피 신청을 할 수 있다

8) 심사위원회는 해당 설계공모의 특성상 필요하다고 판단하는 경우에는 설계공모 참가자에게 공모안에 대하여 설명을 추가적으로 요구할 수 있으며, 설계공모 참가자는 이에 응하여야 한다.

9) 심사위원은 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제11조 제1항 제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제 5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받음을 인지한다.

나. 심사결과의 발표 및 공개

심사결과는 당선작 및 입상작에 한하여 심사일로부터 7일 이내에 입상작 서면통보 및 한국농어촌공사 홈페이지에 공지한다.

다. 기타

1) 심사결과 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 등을 선정하지 않을 수 있다.

2) 응모자는 심사결과에 대하여는 이의제기를 할 수 없으며, 지침서에 명시된 내용 외 보상을 요구할 수 없다.

라. 심사위원의 제척·기피·회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

- 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

- 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청을 할 수 있음

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서를 제출하고 심사를 회피해야 함

2. 당선작 및 입상작 결정방법

가. 작품심사기준

1) 당선작 및 입상작 결정방법과 심사기준은 아래 『작품심사기준』을 고려하여 설계공모 심사위원회에서 정한다.

2) 작품심사는 「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은 법 시행령 제17조 「건축 설계 공모 운영지침」(국토교통부고시 제2021-872호)에 따른다.

나. 절차기준

1) 심사위원회는 작품심사 시작 전에 발주기관에서 상정한 대상작품과 실격사유를 심의하여 실격여부를 결정할 수 있다 (실격 판정 시 평가대상에서 제외)

2) 심사위원회의 평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 위원회 의결을 통해 투표제+채점제 또는 채점제로 조정 가능하다.

3) 심사위원회는 투표제에 의한 작품평가에 대하여 배점기준에 의거 항목별로 상대평가 하여 『작품심사 결과』를 결정한다.

4) 심사위원회는 발주기관에서 상정한 감점 대상 및 감점 사유를 심의하여 의결하고 평가에 반영한다.

5) 채점제 적용 시, 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 환산평점에 의결된 감점 점수를 반영하고 산정한다.

6) 채점제 적용 시, 각 심사의원의 채점결과의 최고점과 최하점을 제외한 평균점수와 설계지침위반으로 인한 감점을 합산하여 최고점수를 받은 작품을 당선작으로 확정한다.

7) 투표제 적용 시, 감점 점수는 없으나 감점사항을 심사 시 참고자료로 제공한다.

8) 투표제 적용 시에도 ‘Ⅴ. 심사 관련 사항 - 3. 심사 채점기준 - 나. 심사 : 채점제 (100점 만점) - 2) 실격 및 감점 기준’의 실격 대상 동일하게 적용한다.

3. 심사 채점기준

가. 투표제

1) 평가주안점

평가분야	평가항목
설계자의 경험 및 역량	○ 담당건축사의 경력
	○ 담당건축사의 유사프로젝트 실적
	○ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오
수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도
	○ 과제에 대한 제안 ∙제안의 적절성, 독창성, 실현성 등
	○ 수행계획 ∙공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등
	○ 제안서 발표 및 면접 ∙추진의지의 적극성 등
공모안 작성요건 위반	○ 기준 쪽수 초과 ○ 지침에 허용되지 않은 렌더링한 3차원 이미지 등 ○ 이미지에 치수․축적에 관련된 내용 포함
그 밖의 사항	○ 심사위원 사전 접촉 이력 등

나. 심사 : 채점제 (100점 만점)

1) 평가항목별 배점 기준

○ 설계자의 경험 및 역량 (20점)

- [정량적 평가] 경력 및 유사프로젝트 실적부문(10점)

평가항목

배 점

세 부 평 가 기 준

계

(10)

담당건축사의 경력

(5)

건축사면허취득일 이후 경력만 인정

5년 이상	4년 이상	3년 이상	2년 이상	1년 미만
5	4	3	2	1

담당건축사의

유사프로젝트

실적

(5)

5건 이상	4건	3건	2건	1건 이하
5	4	3	2	1

* 유사프로젝트 실적은 국가, 지방자치단체, 공공기관에서 발주한    사업(최근 10년 이내 용역 완료)으로 ‘건축법 시행령’[별표1]

용도별 건축물의 종류 중 제1종 근린생활시설의 설계용역에

한하여 인정함.(공고일 기준)

* 공공기관 : 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관에 해당하는 기관

* 실적관리 수탁기관 (대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는     발주 기관에서 발급한 증빙서류를 함께 제출.

* 건설기술인 경력증명서와 기술용역이행 실적증명서 제출

* 건설기술인 경력증명서에 담당업무가 설계분야만 인정

* 공동참여 여부와 상관없이 건수 산정함.

- [정성적 평가] 담당건축사의 대표작품 포트폴리오(10점)

평가항목

배 점

세 부 평 가 기 준

계

(10)

담당건축사의 대표작품

(10)

·설계의 작품성, 창의성 등을 갖춘 제1종 근린생활시설 2작품 제출 (최근 10년 이내)

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

* 설계개요 - 대지위치는 제외

* 건축물 이름, 지역명, 설계자를 알 수 있는 내용은 OOO표시

ex) OO센터, OO하우스, OO구, OOOO원

○ 수행계획 및 방법 (80점)

- [정성적 평가] 업무에 대한 이해도, 과제에 대한 제안, 수행계획, 제안서 발표(80점)

평가항목

배 점

세 부 평 가 기 준

계

(80)

업무에 대한

이해도

(10)

·업무내용 및 추진배경에 대한 이해도

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

과제에 대한

제안

(60)

과제1

(20)

·제안의 적절성, 독창성, 실현성 등(과제당 점수를 합산하여 계산)

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

과제2

(20)

·제안의 적절성, 독창성, 실현성 등(과제당 점수를 합산하여 계산)

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

과제3

(20)

·제안의 적절성, 독창성, 실현성 등(과제당 점수를 합산하여 계산)

수	우	미	양	가
20	18	16	14	12

수행계획

(5)

·공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

수	우	미	양	가
5	4	3	2	1

제안서 발표

(5)

·사업 추진의지의 적극성 및 사업 책임기술자의 업무에 대한 이해도 등

수	우	미	양	가
5	4	3	2	1

2) 실격 및 감점 기준

위반내용	실격 및 감점기준	감점 한도	비고
• 건축법 등 관계법령을 중대하게 위배한 경우	실격 (심사제외)
• 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우
• 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구, 이미지 등 포함 된 경우(단, 제안서 8부중 1부는 제외)
• 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
• 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을행사한 경우
• 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
• 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비 사항이 발견될 경우
• Ⅳ. 설계도서 관련사항 - 2. 작성방법 - 가. 공통사항 위반시	1점 /항목당	3점
• Ⅳ. 설계도서 관련사항 - 2. 작성방법 - 나. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준 위반시	1점 /항목당	3점
• 제출부수 부족 시	1점 /부당	3점

※ 실격 및 감점사항에 해당할 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 확정 및 평가에 반영함.

※ 투표제 적용 시, 감점 점수는 없으나 감점사항을 심사 시 참고자료로 제공하며, ‘Ⅴ. 심사 관련 사항 - 3. 심사 채점기준 - 나. 심사 : 채점제 (100점 만점) - 2) 실격 및 감점 기준’의 실격 대상 동일하게 적용한다.

3) 공모 제출자수 별 평가등급 배분

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2,3	1		1(2)
4	1		2	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1
7	1	1	2	2	1
8	1	2	3	1	1
9	1	2	3	2	1
10	1	2	4	2	1
11	1	2	5	2	1
12	1	3	5	2	1
13	1	3	5	3	1
14	1	3	6	3	1
15	2	3	6	3	1
16	2	3	6	3	2
17	2	3	7	3	2
18	2	4	7	3	2
19	2	4	7	4	2
20	2	4	8	4	2

4. 심사방법

가. 일반사항

1) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

2) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

3) 발주기관 등 (발주기관 등이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

4) 심사위원회는 해당 설계 공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

5) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만이면 심사위원회를 다시 개최함

6) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 때 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

7) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

8) 모든 평가방식은 실격 대상에 해당할 경우, 심사위원회의 의결을 거쳐 실격을 확정함.

나. 심사방법

1) 투표제

- 평가는 설계자의 경험 및 역량, 수행계획 및 방법, 공모안 작성요건 위반, 그 밖의 사항 등으로 구성됨

2) 채점제

- 평가는 100점 만점을 기준으로 설계자의 경험 및 역량 20점, 수행계획 및 방법 80점   으로 구성됨

· 정략적 평가: 담당건축사의 경력 및 유사프로젝트실적 평가 (10점)는 제출된 자료에 의거   사전평가하고 간사가 점수표를 위원장에게 제출하여 평가점수에 반영함

· 정성적 평가: 담당건축사의 대표작품 (10점)과 수행계획 및 방법 (80점)은 심사위원들이   심사 당일 평가

- 정성적 평가는 최고점수와 최저점수를 제외한 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한    점수 (평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림)로   평가

다. 실격기준

공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 설계공모 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있음

1) 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

2) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등 (단, 제안서 8부중 1부는 제외)

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우

4) 직 · 간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

5) 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

6) 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

7) 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

8) 저작권법을 중대하게 위반한 경우

9) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우

라. 불이익 처분방법

1) 감점사항에 대하여는 해당 설계공모 참가자의 확인을 거쳐 심사위원회 개최 시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함

다만, 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출함

2) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있으면 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음

마. 심사결과 발표 및 공모안 반환

1) 심사 결과의 발표 및 공개

- 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과 (평가점수, 평가의견 등)를 서면이나 한국농어촌공사 홈페이지를 통해 실명으로 공개함, 다만, 입상하지 못한 설계공모 참가자 등의 실명을 비공개할 수 있음

- 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 한국농어촌공사에 요청하여야 하며 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록을 열람할 수 있음

- 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의를 제기할 수 없음

2) 공모안 반환

- 입상작 (당선작, 그 밖의 입상작)은 반환하지 않음

- 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담하고, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주기관 등이 임의 처리하며, 응모자는 임의 처리와 관련하여 이의를 제기할 수 없음

5. 심사 진행 계획

순서	시 간	소요시간(분)	내 용	비고
1	14:00 ∼ 14:05	5	개 회
2	14:05 ∼ 14:15	10	심사개요 및 평가방법 안내
3	14:15 ∼ 14:20	5	위원소개 및 위원장 선출
4	14:20 ∼ 15:20	60	업체발표(업체당 20분)	3
5	15:20 ∼ 15:30	10	휴 식
6	15:30 ∼ 16:10	40	업체발표(업체당 20분)	2
7	16:10 ∼ 16:30	20	투표 및 총평
8	16:30 ∼ 16:40	10	투표집계표 확인 및 서명

※ 심사시간 : 업체당 20분이내(발표 10분, 질의응답 10분)

※ 제안서 발표순서 : 심사위원회 당일 추첨을 통하여 결정(제안서 제출 순으로 추첨)

※ 제안업체는 질의답변 후 퇴장, 심사 세부일정은 당일 사정에 따라 변경될 수 있음

※ 업체 수에 따라 일정변경 될 수 있음

Ⅵ. 저작권 및 기타사항

1. 제출 작품에 대한 지적 소유권

가. 당선작 및 입상작은 반환하지 않고 한국농어촌공사가 보관한다.

나. 당선작과 입상작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

다. 우리공사는 당선작 외의 작품 (우수작, 가작)의 경우에도 필요한 경우 저작자와 별도의 협의 없이 전시 또는 출판할 수 있으며, 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

라. 우리공사는 당선작 외의 작품 (우수작, 가작)에 대해 당해 설계자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

마. 입상작 이외의 응모작품은 당선작 발표 후 7일 이내에 찾아가지 않을 경우 우리공사가 임의 처리하며, 이러한 처리에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

2. 당선이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 “국가를 당사자로 하는 계약에 의한 법률”과 한국농어촌공사의 계약기준에 따른다.

2) 당선자는 건축, 토목, 조경 및 설비분야 (전기․기계․통신․음향․소방 등)에 대한 자격요건이 있는 관계 법령에 의한 적법자격요건을 갖춘 설계자와 분담이행 하여야 한다.

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 한국농어촌공사가 갖는다.

4) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 한국농어촌공사와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 1개월 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

5) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 실시설계가 수행되지 못할 경우 2등 (우수작) 및 3등 (가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

6) 당선자로 결정된 후 계획 변경 등 발주청의 사정에 의해 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 지급한다.

7) 당선자가 실시설계를 시행함에 있어 공사비 (설계비)의 과다 증가를 유발하여 발주처가 당초 예산으로 사업수행이 어려울 경우 공모신청 내용의 허위 사항으로 간주하여 당선에 따른 설계권을 취소하는 등 행정적인 조치를 취할 수 있다.

8) 설계용역 계약자는 총공사비의 증가로 인한 추가 용역비는 요구할 수 없다.

나. 설계진행

1) 설계공모는 실시설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행과정별로 발주청과 협의하여 설계하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완, 수정하며, 계약금액 변경 없이 설계에 이를 반영하여야 한다.

3) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 발주청의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

5) 실시설계 과업기간 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출해야 하며 기타, 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

6) 설계 중 각종협의, 관련절차이행 (BF인증, 기술심의, 건축협의 등) 및 발주처 사정 등으로 과업이 지연될 경우 사전에 발주기관의 승인을 득하여 설계기간을 연장할 수 있다.

7) 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

8) 건축서비스산업진흥법 제22조(설계의도구현) 및 동법 시행령 제19조(건축 과정에서의 설계자참여 기준 등)에 의거 공사 전 과정에서 적극 참여하여 설계자의 의도가 올바로 반영되도록 하여야 한다.

Ⅶ. 붙임 및 각종서식

<붙임> 송학활력공동체센터 신축부지 현황

<별지 제1호 서식> 제안공모 응모신청서

<별지 제2호 서식> 설계공모 참여자 명단

<별지 제3호 서식> 청렴서약서

<별지 제4호 서식> 사용인감계

<별지 제5호 서식> 위임장

<별지 제6호 서식> 설계공모 서면 질의서

<별지 제7호 서식> 설계공모 제안서 제출서

<별지 제8호 서식> 담당건축사 경력 및 실적

<별지 제9호 서식> 심사번호 기재란 규격

<별지 제10호 서식> 설계공모 제안서 표지

<별지 제11호 서식> 심사위원 기피·회피 신청서

<별지 제12호 서식> 사전접촉 금지서약서

<별지 제13호 서식> 사전접촉 여부 확인서

<별지 제14호 서식> 투표용지1 (투표제)

<별지 제15호 서식> 투표용지2 (투표제)

<별지 제16호 서식> 투표집계표1 (투표제)

<별지 제16호 서식> 투표집계표2 (투표제)

<별지 제17호 서식> 평가사유서

<별지 제18호 서식> 심사위원별 평가표 (채점제)

<붙임> 송학활력공동체센터 신축부지 현황

○ 부지현황

부지

※ 소요면적 기준 (실 면적 참고자료로만 활용)

※ 소요면적 기준에 준수하여 송학활력공동체센터 면적의 ±5% 범위내에서 조정가능

- 총면적 범위 내에서 근무인원에 따른 각 실별 면적 조정가능

<별지 제1호 서식>

제안공모 응모신청서
대 표 설 계 사무소	업체명		전화번호
			Fax
	대표자 (건축사)		사업자등록번호
	주소	(우)	E-mail
한국농어촌공사에서 시행하는 [송학면 농촌중심지활성화사업] 세부설계용역 제안공모에 참여함에 있어 공고문 및 설계지침서 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 20 . . . 신청인 (대표자) : (인) 한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하

<별지 제2호 서식>

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 한국농어촌공사 충북지역본부에서 시행하는 [송학면 농촌중심지활성화사업] 세부설계용역 제안공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모 대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

20  .    .    .

대표자 : 소속        직위        성명             (인)

한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하

<별지 제3호 서식>

청 렴 서 약 서

본인은 한국농어촌공사 충북지역본부에서 시행하는 [송학면 농촌중심지활성화사업] 세부설계용역 제안공모에 응모함에 있어 귀 공사의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 공사의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

20  .    .    .

업 체 명 :

소 재 지 :

대표이사 :               (인)

한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하

<별지 제4호 서식>

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 한국농어촌공사 충북지역본부에서 시행하는 [송학면 농촌중심지활성화사업] 세부설계용역 제안공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

20  .    .    .

주  소 :

상  호 :

대표자 :

한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하

<별지 제5호 서식>

위   임   장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호	(주민번호 뒷자리 생략)		연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 한국농어촌공사 충북지역본부에서 시행하는 [송학면 농촌중심지활성화사업] 세부설계용역 제안공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 20 . . 업체명 : 대표자 : (인) 한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호		(주민번호 뒷자리 생략)
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중 임을 증명 합니다 20 . . . 업체명 : 대표자 : (인)

※ 대리인 신분증 지참 (신분증 미지참 등 신분확인 불가 시 접수불가)

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

<별지 제6호 서식>

설 계 공 모  서 면 질 의 서

◦ 제안공모명 : 송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역 제안공모

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호	-
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (페이지)	질 의 내 용
	※ 질의서는 E-mail 접수하며, 발송 후 수신여부를 근무시간 (09:00~18:00) 내 반드시 확인할 것. ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 별도 통보

※ 서면질의서 접수사항을 반드시 담당자를 통해 확인하시기 바랍니다. 김소이 (043-290-3411)

<별지 제7호 서식>

제안공모 제안서 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
작 품 제출자	대표 업체명
	대표자 (건축사)
	소 재 지					전화
귀 공사에서 시행하는 [송학면 농촌중심지활성화사업] 세부설계용역 제안공모에 제안서를 제출합니다. 첨부 1. 담당건축사의 경험 및 역량 관련 자료(원본 1부) - 심사용 담당건축사의 경력 및 실적<별지 제8호 서식> - 담당건축사의 유사용역실적 증명서 2. 설계공모 제안서<별지 제10호 서식> (보관용 1부, 심사용 7부 총 8부) ※ 보관용 : 업체명 표기 / 심사용 :‘한국농어촌공사’ 표기 3. 위 1, 2 내용을 포함하여 저장(PDF 파일)한 USB 1매 20 . . . 신청인 (인) 한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하
-------------- (인) -------------- 절 취 선 ---------------- (인) ----------------
『송학면 농촌중심지활성화사업] 세부설계용역 제안공모』접수 확인증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명				소 재 지
대표자(건축사)				전화번호
제 출 자		소속 : 직위 : 성명 : (인)

<별지 제8호 서식>

담당건축사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호	(주민번호 뒷자리 생략)
근무처주소지	(전화번호 : )			E-Mail	(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일	종 별	인 가 번 호	인 가 기 관
	기간	근무처	부서	직위
경 력
	사업명 (공모명)		연면적	용역기간	발주처
유 사 프로젝트 실 적

※ 담당건축사의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적은 국가, 지방자치단체, 공공기관에서 발주한 사업(최근 10년 이내 용역 완료)으로

‘건축법 시행령’[별표1] 용도별 건축물의 종류 제1종 근린생활시설 설계용역에 한하여 인정함.

<별지 제9호 서식>

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20mm
							30mm

<별지 제10호 서식>

〈선택용지 : A3〉

[송학면 농촌중심지활성화사업]

세부설계용역 제안서

20  .   .

한국농어촌공사

<※ 보관용 1부 : 업체명 표기, 심사용 7부 : ‘한국농어촌공사’ 표기>

※ 〈     〉안의 내용을 삭제 후, 나머지 서식은 그대로 출력하여 사용할 것(글꼴, 크기 변경 금지)

<별지 제11호 서식>

심사위원 기피·회피 신청서

□ 제안공모명 : 송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역

□ 기피·회피 위원

성 명	소 속	기피·회피 사유

20  .    .    .

제 출 자    소  속 :

직  위 :

연락처 :

성  명 :                (인)

한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하

<별지 제12호 서식>

사전접촉 금지 서약서

본인은 송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역 제안공모 심사와 관련하여, 공정하고 투명한 심사를 위해 이유여하를 막론하고 응모업체와 사전접촉을 하지 않을 것을 서약합니다.

20  .    .    .

제 출 자   소  속 :

성  명 :             (인)

한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하

<별지 제13호 서식>

사전접촉 여부 확인서

본인은 송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역 제안공모 심사와 관련하여, 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도한 응모업체에 대한 사실여부를 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 업 체 명 : ∙ 일시/장소 :

20  .    .    .

제 출 자   소  속 :

성  명 :              (서명)

한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하

<별지 제14호 서식>

투표용지1 (투표제)

송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역

제안공모 심사위원 투표용지 (   )차

업체 투표	A	B	C	D	E
( )차 투표

위와 같이 심사하였음

20  .    .    .

심사위원 :            (서명)

심사위원장 귀하

<별지 제15호 서식>

투표용지2 (투표제)

송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역

제안공모 심사위원 투표용지 (   )차

업체 투표
( )차 투표

위와 같이 심사하였음

20  .    .    .

심사위원 :           (서명)

심사위원장 귀하

<별지 제16호 서식>

투표집계표1 (투표제)

송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역 제안공모 심사위원회 투표집계표 (   )차

업체 위원	A	B	C	D	E
득표합계
순위

위와 같이 ( 작품(  ), 작품(  ) )을 (  )차 심사 통과 작품으로 결정하였음

20  .    .    .

심사위원장 :           (서명)

한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하

<별지 제16호 서식>

투표집계표2 (투표제)

송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역 제안공모 심사위원회 투표집계표 (   )차

업체 위원
득표합계
순위

위와 같이 작품(  )을 당선작, 작품(  )을 우수작으로 결정하였음

20  .    .    .

심사위원장 :           (서명)

한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하

<별지 제17호 서식>

평 가 사 유 서

◦ 제안공모명 : 송학면 농촌중심지활성화사업 세부설계용역

구 분	평 가 사 유
A
B
C
D
E

20  .    .    .

심사위원 :           (서명)

한국농어촌공사 충북지역본부장 귀하

<별지 제18호 서식>

심사위원별 평가표(채점제)

○ 업체명 :

구 분	평 가 내 용	점수계산방법					점수
		수	우	미	양	가
담당건축사의 대표작품 (10)	- 설계의 작품성, 창의성 등	10	9	8	7	6
업무에 대한 이해도 (10)	- 업무내용 및 추진배경에 대한 이해도	10	9	8	7	6
과제에 대한 제안 (60)	- 과제1 제안의 적절성, 독창성, 실현성 등 (과제당 점수를 합산하여 계산)	20	18	16	14	12
	- 과제2 제안의 적절성, 독창성, 실현성 등 (과제당 점수를 합산하여 계산)	20	18	16	14	12
	- 과제3 제안의 적절성, 독창성, 실현성 등 (과제당 점수를 합산하여 계산)	20	18	16	14	12
수행계획 (5)	- 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등	5	4	3	2	1
공모안 발표 (5)	- 사업 추진의지의 적극성 및 사업 책임기술자의 업무에 대한 이해도 등	5	4	3	2	1
총 점 수 (90점)

※ 해당항목에 표기가 없는 경우 0점 처리

심사위원 :              (서명)