설 계 공 모  지 침 서

(호원 실내 배드민턴장 건립 기본 및 실시설계 용역)

2024. 4.

의정부시

(체 육 과)

-  목          차  -

제1장 사업의 개요

1. 사업의 목적	4

2. 사업개요	4

제2장 설계공모 개요

1. 설계공모의 목적	5

2. 설계공모 방식	5

3. 설계공모 추진일정	5

4. 설계공모 응모자격	6

5. 참가등록	7

6. 현장설명회	7

7. 질의접수 및 회신	8

8. 자료제공	8

제3장 공모안의 작성 및 제출

1. 작품 접수	8

2. 공모안의 작성	9

제4장 심사 관련 사항

1. 심사위원 구성 및 운영	10

2. 평가 방식 및 심사	11

3. 설계기준 및 지침서 미준수에 대한 조치사항 등	13

3. 당선자 선정	14

제5장 설계지침

1. 설계의 기본 방향	16

2. 설계 주안점	17

3. 세부계획	18

4. 위치도 및 현장사진	24

[참고]서식	25

1. 사업의 개요

1.1 사업의 목적

본 과업은 직동근린공원 내 유휴공간에 실내 배드민턴장을 건립하여 주민의 생활체육 참여기회 확대 및 활성화를 도모하여 건강증진 및 여가선용에 기여하고자 함.

1.2 사업개요

가. 사 업 명: 호원 실내 배드민턴장 건립 기본 및 실시설계 용역

나. 발주기관: 의정부시

다. 대지현황

대지위치	경기도 의정부시 호원동 381-27번지 일원
부지면적	31,000㎡(기존부지 27,090㎡ + 추가 편입 3,910㎡)
지역/지구	자연녹지지역, 공원
건 폐 율	20%
용 적 률	80%

※ 호원 실내 배드민턴장 건립은 기존 실내 테니스장 부설주차장 부지에 증축하는 사항으로, 상기 도시계획 사항에 대하여 참여자가 법규 검토 시 반드시 확인하여야 하며, 법규 검토 미비에 따른 책임은 설계참여자에 있음.

라. 규    모(증축)

층 수	지상 2층 이내
연 면 적	증축 1,000㎡이내(허용범위 ±10% 내)
용 도	운동시설(배드민턴장)
예정공사비	2,978,492,600원 (부가가치세, 관급자재비 포함)
예정설계비	공고서에 따름

※ 설계범위는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방분야 등 전체 설계와 지적측량비, 인증(에너지효율등급 인증<1++등급>, BF인증, 제로에너지건축물 인증<4등급>) 취득 및 비용, 각종 인·허가, 자문· 심사(심의), 보고자료 등 설계에 필요한 제반 사항 일체 포함

마. 용역기간 : 착수일로부터 150일

2. 설계공모 개요

2.1 설계공모의 목적

호원 실내 배드민턴장을 예술성, 창의성, 기능성을 겸비한 건축물로 건립하고자 설계공모를 실시하여 가장 우수한 설계안을 제출한 업체를 설계 용역업체로 선정하고자 함.

2.2 설계공모 방식 : 간이공모

「건축 설계공모 운영지침(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30.)」 제2조 제8호에 의한 간이공모

2.3 설계공모 추진일정

구 분	추진일정	세 부 내 역
시 행 공 고	’24. 5. 9.(목)	◦조달청 나라장터, 시 홈페이지, 세움터 ※심사위원 명단 공개(설계공모지침서)
응모신청서 등록	’24. 5. 9.(목) ~ ’24. 5. 13.(월)	◦이메일 접수: dkhkdkgh@korea.kr ※ 설계공모 지침서에 명시된 제반서류 제출 ◦등록 마감일 18:00까지 접수분 유효
현장설명회	‘24. 5. 14.(화) (14:00)	◦장 소 : 의정부시 호원동 381-27번지 일원
질의접수	’24. 5. 16.(목) (09:00 ∼ 18:00)	◦질의서 양식에 의한 서면질의(1회에 한함) ◦이메일 접수: dkhkdkgh@korea.kr ※ 접수 여부 유선 확인
질의응답	’24. 5. 21.(화)	◦개별 이메일 발송
공모안접수	’24. 6. 7.(금) (09:00 ~ 18:00)	◦접수장소 : 의정부시청 체육과(별관 3층) ◦직접방문 접수 ◦근무시간 내에만 공모안 접수 가능
공모안심사	’24. 6. 13.(목)	◦투표제(서면 심사)
당선작발표	’24. 6. 14.(금)	◦의정부시 홈페이지 등 게시
공모안반환	결과발표 후 7일 이내	◦당선작 및 입상작은 반환하지 않음 ◦기간 내 반환 미요청시 임의 처분
계약 및 입상금	결과발표 후 10일 이내	◦계약부서와 (수의)계약 절차 이행 ◦입금계좌 지정 지급(개별통보)

※ 설계공모 추진일정은 향후 변경될 수 있으며, 최종 일정은 공고문을 참조하시기 바람

2.4 설계공모 응모 자격

가. 응모자격

1) ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 자격을 갖춘 자로서 설계공모 공고일 현재 다음 사항에 해당하는 업체

① 공고일 현재 「건축사법」제7조 및 같은 법 제23조에 따라 건축사자격을 취득한 자로서 건축사사무소 개설신고를 한 자(‘법인’을 포함)로 관계 법령에 결격사유가 없는 자

② 「건축사법 시행령」제21조의2에 따라 외국건축사 면허 및 자격을 갖춘 자로 국내 건축사사무소 개설자와 공동업무수행 협약을 체결한 자(이 경우 주계약자는 국내 건축사로 함)

③ 공동 응모 시 선임한 대표자는 공동참가자를 대표하여 본 설계 공모 관련 문서 제출과 수령, 권리 취득과 포기 등에 관한 대표 권한을 갖는다. (단, 공동응모 시 2개 사 이내로 하며, 응모신청서 접수 이후에는 공동응모를 변경할 수 없음)

④ 설계공모 참가등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 해당 응모자 전부의 참가자격을 박탈한다.

2) 당선자는 계약 시 전기·소방·통신 분야 등의 자격이 없는 경우 ｢전력기술관리법｣, ｢소방시설공사업법｣, ｢엔지니어링산업 진흥법｣ 등 각 분야별 관계법령에서 정하는 기준에 따라 등록 및 신고 등을 필한 자와 공동도급(분담이행방식)하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다. 기타 계약에 관한 사항은｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣에 의한다.

3) 자격제한

- 응모신청 등록일로부터 공모(안)접수 기간까지 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 응모신청(공모참여) 할 수 없다.

※ 응모신청(공모참여) 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이 아님을 증빙하는 관계서류 등을 제출해야 함(공동응모자 포함)

- 해당 기한 내에 건축설계공모 응모신청서를 접수하지 않은 자

- 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하거나 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모한 자

- 응모신청서를 접수하고 현장설명회에 참가하지 아니한 자

2.5 참가등록

가. 기     간 : ‘24. 5. 13.(월)

나. 응모 방법

1) 설계공모 응모신청서를 작성하여 이메일 접수

※ 이메일 주소: dkhkdkgh@korea.kr

2) 참가등록자는 반드시 유선(031-828-4363, 공모담당자)으로 수신 여부를 확인해야 하며, 그 외의 방법(우편 또는 팩스, 인편 등)으로 접수 불가함

3) 등록마감일 18:00까지 이메일 접수분에 한함

다. 응모신청자 구비서류

1) 건축설계공모 응모신청서 및 첨부서류 1부(서식 1 참고)

2) 참여자 명단(서식 2 참고)

3) 보안각서(서식 3 참고)

4) 대표자 선임계 1부(공동응모 또는 공동대표일 경우)(서식 4 참고)

5) 공동응모협정서 1부(공동응모일 경우)(서식 5 참고)

6) 설계공모 참가자 서약서, 사전접촉 금지 서약서 각 1부(서식 6, 7 참고)

7) 개인정보 수집·이용 동의서 1부(서식 8 참고)

2.6 현장설명회

가. 장    소 : 경기도 의정부시 호원동 381-27번지

나. 일    시 : ’24. 5. 14.(화) 14:00

다. 참석대상 : 설계공모 응모업체 대표자 또는 설계 참여자

※ 설계참여자는 등록 신청시 제출된 설계참여자

라. 자료준비 : 입찰정보 게재자료 <설계공모 지침서> 개별출력 지참

- 참석 시 : 신분증, 위임장 및 재직증명서(설계 참여자인 경우)

※ 현장설명회 불참한 자(업체)는 공모안 제출 불가

2.7 질의접수 및 회신

설계지침서 상 내용이 불명확하거나 모호한 부분은 ‘건축설계공모 질의서[서식 9]’ 작성 후 직접 또는 E-Mail로 질의(질의는 등록업체별 1회에 한함.)하며, 질의서의 답변사항은 본 건축 설계공모 설계지침서와 동일한 효력을 가지며, 질의에 대한 답변은 개별 이메일로 통보함.

가. 접수기간 : ‘24. 5. 16.(목) 09:00 ~ 18:00

(E-Mail: dkhkdkgh@korea.kr)

나. 응답 예정일 : ’24. 5. 21.(화)

(개별 이메일 통보)

다. 유의사항

1) 질의자격은 참가등록 기간 내에 응모신청서를 등록한 자에 한한다.

2) 질의서는 접수기한(마감시한) 내 접수분에 한하여 유효함.(서식 9 참고)

3) E-Mail의 경우 담당자 수신여부 반드시 확인, 확인하지 않은 사항으로 누락된 것에 대해서는 우리 시에서 책임지지 않는다.

2.8 자료제공

가. 일    시 : ‘24. 5. 14.(화)

※ 우리 시 사정에 의하여 일정은 변경될 수 있음

나. 제공방법 : 현장 설명회 참가자 개별 이메일 제공

다. 내    용

- 측량성과도

- 상·하수도 관망도

3. 공모안의 작성 및 제출

3.1 작품 접수

가. 제출일시 : ’24. 6. 7.(금) 09:00 ~ 18:00

나. 제출방법 : 방문 제출

*주소 : 경기도 의정부시 시민로 1(의정부시청 별관3층 체육과/031-828-4363)

다. 제출서류(서식 참고)

- 설계 공모(안) 제출서(서식 9 참고)

- 설계설명서 A3 8부(보관용 1부, 심사용 7부)(서식 11 ~ 16 참고)

* 보관용(원본) 1부에만 업체명 표기하고, 심사용 7부에는 일체의 표기 (업체명, 로고, 마크 등) 금지

- 위의 내용을 전달할 파일형식 매체 1개(USB, 저장형식 PDF)

- 사전접촉 여부 확인서(서식 17 참고)

- 제출을 위임할 경우, 위임장(서식 18 참고)

- 인감증명서 1부(법인의 경우 법인임감증명서), 사용인감계 1부(서식 19 참고)

3.2 공모안의 작성

가. 도면에 축척과 방위는 정확히 표기한다.

나. A3(겉지 : 흰색 스노우지/속지 : 백상지)로 1면 인쇄를 원칙으로 하며 간지 사용 불가함.

다. 제본은 좌철로 하되 스테플러로 철한 후 검정색 종이테이프로 마감한다.

라. 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법을 사용한다.

마. 개념도, 다이어그램 등은 자유롭게 표현이 가능하고, 도면과 이미지에 컬러 사용이 가능하다.

바. 아래 예시의 이미지(그림1)를 참조하여 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등을 추가할 수 있다.

▮ 그림1 렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >
출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

사. 설계설명서의 구성 및 작성순서

구분	세부내용	쪽수
1. 표지	(서식 12)	1
2. 건축개요	- 계획(안)에 대한 개요(서식 13), 면적표(서식 14) - 계획개념 및 설계의도 등	1
3. 건축계획(안)	- 주요 도면(배치도 및 평면도, 입면도(2면 이상), 주요단면) - 3차원 이미지(해당 사항이 있는 경우)	2
4. 기술검토	- 개략 공사비(서식 15) - 관련 법규 검토서(서식 16)	1
합계	표지 포함	5장 이하

* 위 내용을 포함하여 자유롭게 작성

4. 심사 관련 사항

4.1 심사위원 구성 및 운영

가. 심사일: ‘24. 6. 13.(목)

※ 우리 시 사정에 따라 일정은 변경될 수 있음.

나. 심사위원 구성

1) 위원회 위원의 구성은 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023.4.1.)」에 따라 건축설계 등의 경험이 풍부한 관련 분야의 전문가로 구성한다.

2) 심사위원회는 5인(심사위원장 포함)의 심사위원과 1인의 예비심사위원으로 구성한다.

3) 심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비 고
1	최승민	의정부시 공공건축심의위원회	건축사
2	김영훈	대진대학교	교수
3	윤희철		교수
4	박정하	대한건축사협회 경기도건축사회	건축사
5	조성주	한국건축시공기술사협회	기술사
예비	이주용	대한건축사협회 경기도건축사회	건축사

※ 심사위원의 신병 기타 부득이한 사유 및 기피, 회피, 제척 등으로 심사가 불가할 경우 예비심사위원으로 변경될 수 있다.

다. 심사위원회 운영방법

1) 심사위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

2) 심사위원회는 심사위원 정수의 과반수 참석 시 진행할 수 있다.

3) 위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 의결을 거쳐 공고 시 제시된 사항 이외에 추가적으로 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

4) 심사위원회의 결정이 필요한 사항은 참석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

4.2 평가 방식 및 심사

가. 평가방식 : 투표제(서면심사)

1) 「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제17조「건축설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호)에 의거 투표제를 원칙으로 당선작과 순위를 결정하며, 심사위원은 공모안에 대한 충분한 토론을 거쳐 평가하고, 평가사유서는 우수한 점과 개선사항 등을 구체적으로 작성하여 평가한다.

2) 심사는 투표에 의해 결선투표 대상자 2개사를 선정한 후, 결선투표를 실시하여 다득표자를 당선작으로 선정한다.

3) 심사대상 공모안이 7개를 초과하는 경우 2단계로 나누어 결선투표 대상자를 선정하며, 1차 투표에서 다득표순으로 5개사를 선정하여 2차 투표 대상자를 선정한다.

4) 각 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 감점사항을 적용하여 순위를 결정하며, 감정사항에 해당되지 않거나 감점점수가 동일한 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 순위를 결정할 수 있다.

5) 평가방식의 변경할 필요한 경우에는 원활한 심사를 위하여 심사위원회의 의결를 통해 평가방식을 변경할 수 있다.

나. 심사절차 및 기준

1) 심사시 발주기관에서는 제출된 공모안에 대한 사전 검토(실격 및 감점기준) 결과를 심사위원회에 상정하며, 심사위원회에는 사전검토 결과를 확인하고 심사 반영 여부를 결정한다.

2) 심사위원회는 해당 설계공모의 특성상 필요하다고 판단하는 경우에는 설계공모 참가자에게 공모안에 대하여 설명을 요구할 수 있으며, 설계공모 참가자는 이에 응하여야 한다

3) 심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

4) 설계공모 목적에 적합하지 아니하거나 작품 수준이 현저히 떨어진다는 이유로 입상작(당선작, 기타 입상자)을 선정하는 것이 적합하지 않다고 의결될 경우에는 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

5) 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

《 투표제 절차 》

1차 투표	⇨	2차투표	⇨	결선투표	⇨	기타입상작 선정
◾ 다득표 5순위까지 5개사 선정 ※ 공모안이 7개 이하인 경우 생략		◾ 다득표 순으로 5개사 중 2개사 선정 ◾ 3위 이하 다득표 순으로 순위 결정		◾ 다득표자에 대해 당선작 선정		◾결선투표 탈락자를 포함한 3순위 이하 업체에 대하여 순차적으로 과반 이상 찬성에 대하여 기타입상작 선정

《 평가 주안점 》

전문 분야	평가 항목	세부 사항
건축 계획	배치 계획	￭배치 및 토지 활용도 ￭인접 건축물과의 간섭 및 영향 최소화 ￭야외 휴게공간 확보 및 공원과의 연계성 ￭주차시설 계획(최대확보 등), 보행자 및 차량 동선 계획의 적절성 ￭유사시 피난계획, 사용자를 고려한 안전확보 방안 등
	공간 계획	￭내․외부 공간 계획의 적절성 ￭공간 이용의 효율 및 편의성 ￭동선 및 기능배분의 타당성 ￭배드민턴 코트 경기시설 기준 적정성
	경관 및 주변과의 조화	￭주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 ￭입면 디자인 계획의 우수성 ￭색상 및 재료 계획의 적절성
	공사비 적정성 및 기술 계획	￭ 비용 절감 등 경제성(건립, 운영, 유지관리 절감 등) ￭건물 구조 및 공법 등의 우수성 ￭환경친화적 설계기법의 우수성
	기타	￭공공성 제고 방안 ￭기타 추가적인 필요 사항
합 계

4.3 설계기준 및 지침서 미준수에 대한 조치사항 등

가. 불이익 처분기준 적용방법

1) 실격처리 대상은 심사위원회가 작품심사를 시작하기 전에 발주기관에서 실격사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 실격여부를 심사위원회 의결을 거쳐 실격 확정시 대상 작품을 심사 대상에서 제외한다.

2) 감점처리 대상은 심사위원회가 작품평가를 실시한 후에 발주기관에서 감점사유와 대상작품을 심사위원회에 상정하여 감점여부를 심사위원회 의결을 거쳐 감점 확정시 평가에 반영한다.

3) 감점기준

구 분	감 점 항 목	감점	감점한도
지침 위반	․ 건축규모 기준(±10%) 미 준수	1점/1%당	10점
	․ 총 예정공사비 기준(±5%) 미 준수	1점/1%당
	․ 심사용 판넬 지침 외 색채사용	2점/도판당
	․ 경기장높이(1건), 코트간 거리(1건), 코트에서 외벽 까지 거리(1건) 도면(평면도, 단면도) 미 표기	2점/건당
도서작성 기준위반	․ 제출도서 부족	0.2점/부당	2.0점
	․ 설계설명서 지침 외 색채사용	0.2점/쪽
	․ 기타 설계지침서의 도서작성 기준 위반	0.1점/건
	․ 지침 이외 성과물 제출	0.3점/건
	․ 설계설명서 기준 쪽수 위반	0.1점/쪽

4) 실격기준

- 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위반하여 대규모 계획 변경이 불가피한 경우

- 건축규모, 총예정공사비 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

- 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

- 작품 심사전 심사위원과 개별적으로 사전접촉, 사전설명 및 부정·비리 행위가 확인된 경우

- 저작권법에 따라 보호되는 다른 작품을 모방하거나 표절한 경우

- 응모안 제출 후 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

5) 심사위원의 기피, 제척

- 설계공모참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 그 근거자료를 첨부하여 질의응답 접수기간(’24. 5. 16.)까지 기피신청을 할 수 있다.

※ 이메일 신청 dkhkdkgh@korea.kr (서식 10 참고)

4.4 당선자 선정

가. 입상작에 대한 공모안 작성비용 보상

1) 당선자 : 설계권 부여

2) 기타 입상자 : 기타 입상자는 공모심사 점수가 높은 자 순으로 아래와 같이 보상비(천원미만은 절사)를 지급한다.

결 과	구 분		지 침	비 고
	참가업체 수	보상대상 수
입상작	5개 미만	1	5,000,000원	보상비 예산의 1/ 3이내
	5개 이상	2	6,400,000원 4,800,000원	보상비 예산의 4/10이내 보상비 예산의 3/10이내

※ 기타 입상작은 위와 같이 응모작품수에 따라 선정하며 작품수준에 따라 심사위원회의 결정으로 선정하지 않을 수 있음

3) 보상비 예산 : 금16,000,000원 (세금포함)

※ 공동응모의 경우 대표건축사에게 보상비를 지급한다.

나. 당선작 설계자의 의무 등

1) 당선작의 설계자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항을 종합하여 필요한 경우 수정·보완하여 이를 설계에 반영하여야 하며, 실시설계 완료 후 총공사비 증가로 인한 추가 용역비는 요구할 수 없다.

2) 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 기본 및 실시설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 설계용역 계약을 할 때 전기·통신·소방분야 설계면허가 없는 경우에는 관련규정에 의한 전기·통신·소방분야 설계자격자와 분담이행방식으로 공동도급하여야 한다.

4) 실시설계 과업 중에 시행하는 각종 영향평가, 기술심의, 실시계획인가 등 관련 법 규정을 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

5) 당선작의 설계자는 이 지침서와 “과업내용서”를 준수하여야 한다.

다. 제출 작품에 대한 지적 소유권 등

1) 입상작은 반환하지 않고 발주기관이 보관한다.

2) 입상작의 저작권 및 사용권 등 법적 소유권은 발주기관에 귀속한다. 또한, 발주기관은 출판과 전시를 위해 별도의 허락 없이 입상작을 사용하며 각종 출판물의 판권을 소유한다.

3) 발주기관은 입상작 외의 작품의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있다.

4) 발주기관은 응모작품 중 비입상작에 대해 당해 응모자의 동의를 얻어 그 작품에서 아이디어의 일부를 이용할 수 있다.

5) 응모 작품의 반환은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 참가자가 회수하며, 이에 따른 비용은 참가자가 부담한다. 위 기간 내에 회수하지 않은 작품은 발주기관에서 임의로 처리한다.

라. 유의사항 및 기타사항

1) 응모자는 발주처의 현장설명회 일정에 따라 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

3) 설계공모지침서를 준수하여야 한다.

4) 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

5) 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

6) 심사위원회는 심사결과 제출된 작품이 설계공모목적을 달성하기에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어지는 등의 이유로 당선작 또는 입상작을 선정하는 것이 적합하지 않다고 판단되는 경우에는 이를 선정하지 않을 수 있다.

7) 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계경기 진행여부 및 경기방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

8) 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 성립되며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있다. 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

5. 설계지침

5.1 설계의 기본 방향

가. 관계 법령 및 규정에 적합하고, 주변 환경 등에 조화를 이루며 이용자의 접근성 및 편의성을 고려하고, 누구나 이용이 편리하도록 계획하여야 한다.

나. 건물 배치계획 시 인접시설물을 고려하여 향, 조망, 이용자의 편의성, 안전성을 고려하고, 주위 지형 및 경관을 고려하여 설계에 반영한다.

다. 건축물의 용도에 적합하도록 이용자 동선 등을 고려하여 실을 배치하고 편리성과 안전성 등을 고려하여 설계하여야 한다.

라. 에너지 소비량이 많은 대공간이므로 에너지 절약 및 유지관리가 용이한 경제적인 설계가 되도록 한다.

마. 각종 시설은 중앙 집중관리 및 통제가 용이하며, 최소 인원으로 운영, 관리가 가능한 경제적인 설계가 되도록 한다.

바. 자연광, 우수 등의 자연요소를 적극 도입한 친환경 건축계획이 되도록 계획한다.

사. ｢건축물의 에너지절약 설계기준｣, ｢공공기관 에너지절약 추진지침｣, ｢공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정｣ 등 정부의 에너지절약 정책과 환경오염 관련정책을 적극 수용하여 환경친화적인 건축물이 되도록 설계한다.

아. 관리운영이 쉽고 운영비가 저렴한 에너지절약형 및 환경친화형으로 관련 법 규정에 따라 에너지효율등급 “1++등급 이상”, 제로에너지건축물 “4등급 이상”이 되도록 설계한다.

자. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따라 태양광 등 신에너지 설치 의무 대상(2024~25년도 기준 34%)이며, 해당 설비의 설치에 있어 건축물의 외관 및 주변 환경과 조화되도록 계획한다.

차. 공공시설물로서 영유아, 장애인, 노약자, 임산부 등 모두가 이용 가능한 무장애 공간(Barrier Free)과 유니버셜디자인(Universal Design)을 적용한다.

카. 과도한 디자인이나 입면에 치우친 디자인은 지양(止揚)하고, 총공사비는 사업예산을 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

타. 현장 답사 및 현황측량자료를 참고하여 설계한다. 단, 지반조사 자료는 설계단계에서 제공한다.

5.2 설계 주안점

가. 제한된 부지 여건을 고려한 건축물의 효율적 배치 등

1) 주 건축물 배치는 가능한 기존 주차장 부지 범위 내 배치를 우선 고려하여야 하며, 부대시설의 추가 설치, 건축물의 이용 및 공간 구성의 적절성을 위해 불가피할 경우 정보 제공된 ‘현황측량 성과도’ 상 제시된 개발 가능 부지 면적까지 계획이 가능하며, 이 경우 토목공사가 최소화 될 수 있도록 경제성·효율성을 고려하고 절·성토 지형에 따른 안전과 우수에 대응하여 계획하여야 한다.

2) 동측에 인접한 근린생활시설(카페)을 최대한 고려 하여야 하며, 또한 공원산책로와 연계한 동선 및 휴게 공간 계획 한다.

3) 남측 경사 도로를 통한 차량 접근을 고려한 진입부 공간 계획을 통해  진·출입 차량과 이용자간 동선 간섭이 되지 않도록 계획한다.

나. 시설 및 공간 계획 등

1) 경기장의 높이(최소 9m 이상), 규격 등은 경기시설규정(“대한배드민터협회”)에 준하여 계획한다.

※ 경기장 높이는 가장 낮은 반자를 기준으로 하며, 반자가 없는 노출 천장의 경우 가장 낮은 시설물의 하단을 기준으로 하며, 도면(평면도, 단면도)상에 높이, 코트간 거리, 코트에서 가장 가까운 외벽(내측)까지 거리를 표기하여야 한다.

2) 탈의/샤워실(남·여), 화장실(남·여), 관리실, 창고 등을 시설규모 및 이용수요를 고려하여 합리적인 규모로 계획하고, 각 실 간 연계·분리, 공동 사용 등 이용 특성을 고려하여 이용 편의성 뿐만 아니라 시설관리의 효율성을 고려한 공간 계획이 되도록 한다.

3) 테니스장은 경기 중 혼잡을 방지하기 위하여 출입구 및 배드민턴 코트 주변으로 최소한의 여유공간 확보하여야 하며, 동시 사용인원 수를 고려한 대기 공간 또는 관람 공간을 자유롭게 계획하여야 한다.

다. 주차계획 등

1) 지상 1층은 반드시 주차장을 설치할 수 있도록 필로티 구조로 계획하여야 한다.

2) 주차장 댓수는 제시된 개발면적 범위를 포함하여 최소 36대 이상(장애인 2대 이상, 확장형 15대 이상)을 계획하되, 가능한 기존 주차 댓수(41대)를 지향한다.

※ 추후 당선작 결정 후 발주기관과 최대 확보방안을 강구한다.

5.3 세부계획

가. 구조계획

1) 「건축법」 및 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 등에 적합해야 한다.

2) 배드민턴장을 무주공간으로 계획되므로 기초, 모듈, 층고 및 구조형식 등은 건축구조 관련 법규, 건축물 용도, 경제성·시공성을 고려하여 설계하여야 하며, 1층은 주차장 확보를 위해 필로티 구조로 계획하여야 한다.

3) 지반상황에 적합한 기초 구조를 선택 및 설계하여야 한다.

나. 배치계획

1) 사업부지는 공원 부지 내 기존 실내 테니스장 주차장 부지로 공원 및 기존 테니스장과 조화롭도록 하며, 효율적인 토지이용계획 및 건축물 배치가 가능하도록 한다.

2) 인접건물, 외부 공간과의 동선 연계 등을 고려하여 배치를 계획하여야 한다.

3) 북측 성·절토 지형을 고려하여 배치하여야 한다.

4) 재난안전 및 비상시 대응을 위한 배치계획, 동선계획(대피 및 소방진입용) 및 옥외공간계획을 수립한다.

5) 부지 내 보행자 안전을 우선 확보하고 차량 동선이 보행 동선과 간섭되지 않도록 계획한다

6) 남측 경사 도로를 통한 차량 접근을 고려한 진입부 공간 계획 한다

다. 시설계획

층별	세부시설	면적(㎡)	비 고
지상1층	주차장, 계단실 등	제안	필로티 구조
지상2층	배드민턴 코트	제안	4면
	휴게공간		별도 실 구획 불필요
	탈의/샤워실		남,여 분리
	화장실
	창고 (기구 및 관리)	20	± 5%
	관리실	12
합 계 (연면적)		1,000	± 5%

※ 주요시설은 계획안에 반드시 포함되어야 하며, 전체 공사비 이내에 다양하고 창의적인 시설의 추가적 설계참여자 제안 및 층별간 이동이 가능하나, 반드시 1층은 주차장 설치가 가능한 필로티 구조로 하여야 한다. 추후 당선작 결정 후 발주기관과 세부시설을 확정하도록 한다.

라. 평면계획

1) 상호 관련성을 갖는 기능 단위들은 인접하게 배치하여 기능이 효율적으로 구성될 수 있도록 하고, 불필요한 동선이 유발되지 않도록 계획한다.

2) 기능 단위 간 인접성을 최대한 제공하기 위하여 건물의 평면이 길어지는 경우 암실의 발생을 최소화하고 자연채광, 자연환기를 최대한 이용한다.

3) 장애인의 각종시설 이용에 필요한 편의시설을 설치 고려한다.

4) 화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치 계획한다.

5) 관련 소방규정에 준한 대피시설을 충분히 고려한다.

마. 설비계획

1) 초기 투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

2) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개·   1)보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

3) 기계, 전기, 통신, 소방 등 설비 각 분야 간의 긴밀한 협조하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

4) 자동화된 운전관리를 통하여, 업무효율의 극대화 및 인력 절감을 꾀할 수 있도록 계획한다.

5) 협소한 부지 여건상 각종 기계· 전기 설비는 별도의 기계실 또는 전기실을 확보하지 않는 설비의 계획을 지향하며, 관련 법령에 따른 의무설비 설치 등 불가피할 경우에는 유지관리에 지장을 주지 않는 범위에서 합리적으로 계획하여야 한다. 전기실, 전기실 계획 시 장비 유지관리를 위한 서비스 동선을 고려하여야 하며, 소음 및 진동을 고려하여 기계실을 최적위치에 충분한 면적을 확보 후 배치한다.

6) 에너지 및 수자원 절약을 극대화할 수 있는 최적의 설비방식을 추구한다.

7) 화재, 수재 등 비상 상황에 대응할 수 있도록 계획한다.

8) 배드민턴장은 경기에 지장이 없도록 환기 계획을 하여야 하며, 기계환기의 경우 관련 설비 공간 최소화 및 경제성이 고려된 기계환기 설비를 계획하여야 한다.

9) 고효율 기자재의 사용을 비롯한 에너지를 절감할 수 있는 건축기법을 반영한다.

10) 건물 자동화 계획을 충분히 검토하여 공사비 범위 내에 최대한 도입하여 계획에 반영한다.

11) 자동제어공사는 각종 기계설비를 효율적으로 관리하여 에너지절감 및 체계적인 원격제어 기능 및 상황기록, 경보기능 등을 갖춘 컴퓨터를 이용, 종합 관리토록 계획하여야 한다.

바. 토목 및 조경계획

1) 토목

가) 본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로한다.

나) 설계에 임하기 전에 계약상대자는 반드시 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 배수상황 등 제반 주변 사항을 조사하여 경계를 확정하고 조사 내용은 기본설계에 반영하여야 한다.

다) 건축시설물 설치를 위한 주 토공(터파기 등)이나, 추가 계획 부지(공원/임야) 경우 고저차가 있어 일부 절토가 수반 될 가능성이 있으므로 절토가 최소화될 수 있도록 계획하고, 부지의 지형, 토질, 암반 상태 등 현장을 철저히 분석 조사하여 건축물 등 기타 시설물과 일치 및 연관되도록 설계하고 토공의 공학적 해결과 경제·안전적인 측면에서 검토하여 필요한 최소한의 물량산출 및 경비를 산정하여야 한다.

라) 우·오수 및 배수, 상수도 계획은 처리 주변의 지하 매설물(우수, 오수, 전기, 통신, 공동구 등 인입설비) 관로를 조사하고 또한 추가 계획부지(공원/임야) 고저차에 따른 우수 유입경로를 철저히 조사하여 설계에 반영하고, 각종 트렌치 및 우·오수관로의 덮개는 쾌적한 보행환경, 해당 대지의 포장계획 및 도시미관을 고려하여 설계하여야 한다.

2) 조경

가) 조경은 건축법에서 요구하는 대지 안의 조경기준 등 조경공사 설계에 적용되는 관련 법규 및 제반 규정을 준수하여 계획하여야 한다.

나) 조경 계획시 해당 지역의 자연환경 등을 고려하여 차음, 차폐, 경관 등 기능적 측면의 디자인 요소를 반영하며 주변 환경과 조화를 이루는 계획을 하여야 하며, 대지 내 음영 발생을 고려한 식재계획을 하여야 한다.

다) 조경은 ‘의정부시 건축조례’ 등을 고려하여야 하고, 이용자 편의 및 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

사. 전기 및 통신계획

1) 전기

가) 초기투자비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

나) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개·보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

다) 기계, 전기, 통신, 소방 등 설비 각 분야 간의 연관성을 고려하고, 긴밀한 협조하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

라) 화재, 수재 등 비상 상황에 대응할 수 있도록 계획한다.

마) 기계실 및 전기실에는 적정한 크기의 장비 반입구를 계획한다.

바) 필요시 사무실 등의 전기, 전화, OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획한다.(바닥 설치 시에는 콘센트 누전 방지가 될 수 있는 제품을 설치하고 미사용 콘센트 닫힘 장치를 둔다.)

사) 전기설비는 미래지향적인 기술을 적용하며, 최근 개정된 법령 중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

아) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

자) 용량에 맞는 규격 전기 차단기를 설치한다.

차) 접지시설은 전기 접지와 통신 접지를 완벽하게 분리하여 각종 법령에 적합하도록 시설하여야 한다.

카) 장시간 정전에 대비한 비상 발전시설을 건축물 전원 소요량을 산출하여 충분한 용량으로 시설하여야 한다.

타) 전선의 구내 인입은 지하매설로 한다.

파) 옥외에 가로등을 적정하게 설치한다.

하) 배드민턴장의 조명은 경기시설 기준규정에 준하여 계획하여야 하며, 유지관리가 용이한 설비 장치(승강장치)로 계획하여야 한다.

거) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

2) 통신

가) 본 설계는 정보통신설비의 시공관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 운용 및 확장이 용이하도록 하여야 하며 초고속 정보통신망(1등급 기준 이상)을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

나) 정보통신분야 설계 시 국내․외 관련 법규와 규정에 의거 수행하며, 관련 인·허가(정보통신공사 사용전검사 필증 등)에 문제가 없도록 설계하여야 한다.

다) 정보통신설비 설계는 TTA표준(한국정보통신기술협회), KICI(한국정보통신산업연구원) 기준을 준용한다.

라) 건축, 기계, 전기, 소방 등 관련된 분야를 면밀히 검토하여 분야별 구성요소가 서로 원활하게 동작할 수 있도록 설계하여야 하며, 각 분야별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련도면에 명기 하여야 한다.

마) 필요시 적정한 면적의 정보통신실 및 TPS실(또는 EPS실)의 설치를 검토하여야 하며, 정전에 대비하여 주요장비의 운영과 보호를 위해 주요 장비실에는 별도의 비상전원설비 및 장비보호를 위한 항온항습장치의 설치를 검토하여야 한다.

바) 통신실 바닥은 향후 운영 및 유지보수가 용이하도록 이중바닥(Access Floor)으로 설치하며, 인입배관 및 전체 배관 배선 경로의 경제성 및 침수방지 등을 고려하여 통신실 및 주요 장비의 위치를 선정한다.

사) 통합배선반과 구내통신 선로설비(배관 및 배선 경로, 접속점 등)들은 수용변경에 따라 상시 현행화가 될 수 있도록 운용ㆍ관리의 자동화 방안을 제시하여야 한다.

아) 미래 사용자 수요, 망 분리 등을 검토하여 적정용량으로 설계한다.

자) 방범 및 보안관리에 용이한 구조로 설계하여야 한다.

차) 최근 개정된 법령 중 관련 법규(정보통신, 방송, 소방 등)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

5.4 위치도 및 현장사진

【서식 1】

설계공모 참가신청서
대 표	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	E-mail			전화 번호	대표
	주 소				휴대전화
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	E-mail			전화 번호	대표
	주 소				휴대전화
『호원 실내 배드민턴장 건립』 설계공모에 있어서 공모문 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 2024년 월 일 신청인 : (인) 의정부시장 귀하
첨부서류		· 건축사면허증 사본 1부 · 건축사업무신고필증 사본 1부 (법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본) · 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부 · 공고일 기준 행정처분 여부 사실조회서 (건축사협회 또는 등록관청 발급) 1부

【서식 2】

설계공모 참여자 명단

본인은 의정부시에서 시행하는「호원 실내 배드민턴장 건립 설계공모(간이공모)」에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2024년     월     일

응모대표자: 소속         직위         성명             (인)

의정부시장 귀하

【서식 3】

보  안  각  서

□ 공모명 : 호원 실내 배드민턴장 건립 설계공모[간이공모]

본인은 2024년   월   일 귀 시에서 공고한 호원 실내 배드민턴장 건립 설계공모[간이공모]를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 각서로 제출합니다.

가. 본인은 본 설계공모를 시행함에 있어 공고서 및 설계공모지침서 상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것은 물론 작품 설계 전에 설계공모 참여자 전원에 대하여 보안교육을 실시하겠습니다.

나. 본인은 물론 본인 회사에 소속한 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 중대한 문제를 야기 시켰을 경우에는 누설자가 보안관련 법령 및 규정에 따라 처벌 받음은 물론 회사에 대한 용역업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024.   .    .

∘ 참가업체

업 체 명 :

대 표 자 :                (인)

의정부시장 귀하

【서식 4】

대표자 선임계

대표자 성명 (건축사)		주민번호
주 소
전 화 번 호		FAX번호

상기인을 『호원 실내 배드민턴장 건립』 설계공모에 참가하는 대표자로 선임하였으므로 인감증명서를 첨부하여 제출합니다.

2024년    월     일

확인자 : 업체명                    대표자              (인)

【서식 5】

호원 실내 배드민턴장 건립 설계공모

공 동 응 모 협 정 서

제1조(목적) 이 협정서는 의정부시에서 주관하는 『호원 실내 배드민턴장 건립』 설계공모를 (      )와 (      )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조(공동응모의 대표) 공동응모 대표업체(이하 대표업체)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조(공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :                 (소재지 :             대표자 :       )

제4조(대표업체의 권한) 대표업체는 의정부시 및 제3자에 대하여 공동응모 업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계를 시행하는 경우에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조(의무) 공동응모업체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조(책임) 공동응모업체의 구성원은 의정부시에 대한 의무를 이행함에 있어 상호 협의하여 공동으로 책임을 진다.

제8조(구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제9조(권리, 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리, 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조(기타)

① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모 자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도탈퇴 하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하여야 하며 탈퇴업체를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제11조(협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정을 체결하고 그 증거로 협정서 각 1통씩을 작성하여 공동응모구성원이 기명, 날인하여 각자 보관한다.

2024.    .     .

∙ 대표업체

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

∙ 공동응모업체구성원

주    소 :

업 체 명 :                       (전화번호 :             )

대 표 자 :                       (인)

의정부시장 귀하

【서식 6】

설계공모 참가자 서약서

당사는 『호원 실내 배드민턴장 공사』 설계공모에 참가함에 있어 귀 시의 건축설계공모 지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 불공정 행위에 대하여 어떠한 불이익도 감수하고, 설계 공모관련 공모안 제출, 심사, 당선작 결과 등에 대하여 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

2024년       월       일

회사명 :

주  소 :

대표자 :                   (인)

의정부시장 귀하

【서식 7】

사전접촉 금지서약서

본인은 의정부시에서 시행하는 ｢호원 실내 배드민턴장 건립｣ 설계공모 참가자로서 심사에 영향을 줄 수 있는 심사위원 등과 사전접촉을 포함한 불공정 행위를 하지 않겠음을 서약합니다.

참고로, 건축 설계공모 심사위원이 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제11조제1항제4호에 따라 공무수행사인에 해당되어 같은 법 제5조부터 제9조까지의 규정을 준용 받고, 위반 시 같은 법 제22조 및 제23조에 따라 벌칙 또는 과태료 처분을 받을수 있습니다.

2024년     월     일

공모참가자 :                     (서명)

의정부시장 귀하

【서식 8】

【개인정보 수집･이용 동의서】

∎ 관 리 처 : 의정부시청(체육과)

∎ 관련법규 : 개인정보 보호법 제15조, 제22조

∎ 기본 개인정보 수집 • 활용   [필수]

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집·이용의 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 휴대폰번호	건축설계공모 관련 안내 등	기본 및 실시설계 준공일로부터 1년

※ 개인정보 제공 동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항

- 귀하는 개인정보제공 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른 불이익은 없음

개인정보 수집 • 활용에 동의 하십니까 ?    ■동의함.     □동의하지 않음.

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된  개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해     열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함.

2024년     월     일

신청자 :                (인)

의정부시장 귀하

【서식 9】

- 『호원 실내 배드민턴장 건립』 -

설계공모 서면질의서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
건축사사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서는 이메일(dkhkdkgh@korea.kr)로만 접수하며, 근무시간 내 수신 여부를 반드시 확인할 것. - 담당자 : 의정부시 체육과 (Tel: 031-828-4363)

【서식 10】

심사위원 기피 신청서

□ 사  업 명 : ｢호원 실내 배드민턴장 건립｣ 설계공모

□ 기피 위원

성 명	소 속	기피 사유

2024년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

의정부시장 귀하

【서식 11】

설계공모안 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
공모안 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지		전화
귀 시에서 시행하는 『호원 실내 배드민턴장 건립』 설계공모에 공모안을 제출합니다. 2024년 월 일 신청인 (인) 의정부시장 귀하

【서식 12】

설계도면 표지 (A3, 횡)

80

호원 실내 배드민턴장 건립 기본 및 실시설계

10

공모안

40

						30	20
30
20

2024.  .

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 48 Point

- 날짜 : 휴먼명조 40 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

※ 간격 및 글씨체는 권고사항임

【서식 13】

설계개요 및 시설현황

□ 사업명 : ｢호원 실내 배드민턴장 건립｣ 설계공모

구 분		설 계 내 역		비 고
건물개요 (증축)	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	전체	㎡
		증축	㎡
	용적률산정용 연면적	전체	㎡
		증축	㎡
	건축면적	전체	㎡
		증축	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

(작성시 참고사항)

‘건축개요’ 상 건폐율 및 용적율은 전체 면적을 기준

주차대수의 경우 증축하는 위치에 설치하는 주차대수를 기재

3. ‘기타시설물 개요’는 건축물 이외 설계자의 의도에 따라 설치되는 시설물의 개요로서 시설물에 대한 규모 면적 등에 대하여 기재

【서식 14】

각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

【서식 15】

개략공사비 산출내역서

(단위 : 천원)

공 사 별		재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	구성비	비 고
건축공사	건축
	조경
	기계
	○○
	○○
	소계
전기공사
통신공사
소방공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
총 계

【서식 16】

관련법규 검토서
법규 및 조항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

【서식 17】

사전접촉 여부 확인서

본인은 의정부시에서 시행하는 『호원 실내 배드민턴장 건립』 설계공모 심사와 관련하여 심사에 영향을 미칠 수 있는 부당한 청탁이나 사전접촉 등을 시도에 대한 사실 여부를 확인합니다.

사전접촉 여부	해당 있을 경우	비 고
없음( ) / 있음( )	∙ 심사위원명 : ∙ 일시/장소 :

2024.    .     .

업체명:

대표자:              (인)

의정부시장 귀하

【서식 18】

위  임  장

대표자	업체명		성 명
	사업자등록번호		연락처
	주 소
대리인	업체명		성 명
	주민등록번호		연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 의정부시에서 시행하는 「호원 실내 배드민턴장 건립 설계공모(간이공모)」에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2024. . . 업체명: 대표자: (인) 의정부시장 귀하

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 19】

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 의정부시 체육과에서 시행하는 『호원 실내 배드민턴장 건립』 설계공모에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024     월     일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                    (인)