경찰청 장비보관시설 신축공사 실시설계용역 과업내용서

2025. 10.

경    찰    청

- 목        차 -

제1장 총 칙

1. 과업의 개요	1

2. 과업의 범위	2

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	4

2. 업무보고 및 회의	5

3. 설계에 사용하는 재료	6

4. 관급자재의 선정	6

5. 에너지 절약형 건축물 설계	6

6. 보안성 검토	7

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	7

2. 설계 용역 일반지침	8

3. 설계도서의 분리작성	9

4. 설계도서 표기	9

5. 도면작성	9

6. 관계기관 업무협의	10

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통사항	11

제5장 설계도서 납품목록

1. 설계 납품도서	13

[붙임 1] 설계보완 검토사항	15

[붙임 2] 보안각서	20

[붙임 3] 책임기술자 선임계	21

[붙임 4] 하도급 승인 요청서	22

[붙임 5] (계획, 중간, 실시)설계 검사원	24

[붙임 6] 삭제	25

[붙임 7] 삭제	25

[붙임 8] 삭제	25

[붙임 9] Space Program	26

[붙임 10] 장비보관시설 부지 요도	27

[붙임 11] 표준설계관리일정표	28

제1장  총  칙

1. 과업의 개요

본 용역은 경찰장비의 안전하고 효율적인 관리체계를 구축할 수 있는 보안·방호 시스템을 갖춘 특수시설인「경찰청 장비보관시설 신축공사 설계용역」으로, 2017년 진행되었다 중단된 설계도서 일체를 재검토하여 그간 개정된 각종 법령에 맞게 보완·변경하여 실시설계를 완료하고 인·허가를 득하여 착공에 필요한 제반 절차를 완료하는 것을 목적으로 함

가. 용 역 명 : 경찰청 장비보관시설 신축공사 실시설계용역

나. 사업목적 : 노후화된 무기창을 보안·방호 시스템을 갖춘 최신 건물로 신축하여 경찰청 보유 무기·탄약·화학 장비의 안전 및 효율적인 보관·관리체계를 구축, 사용자의 편익과 안정된 근무여건을 보장할 수 있도록 시설을 설계하기 위함

다. 대지위치 : 경기도 광주시 도척면 진우리 40-6 및 40-1일부

라. 시설 규모

1) 대지면적 : 16,700㎡ (대지면적)

2) 신축면적 : 연면적 4,885㎡

3) 건축내용 : 총 7동 철근콘크리트조 (지하1층/지상2층)

4) 용    도 : 공공업무시설

가) 본 과업은 기존 완성된 설계도서를 현 법령에 맞도록 수정 및 보완, 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)와 경찰청(이하 “발주기관”이라 한다)이 협의하여 인허가를 완료한다.

나) 과업 범위의 변경이 없이 공사비가 증가할 경우, 추가용역비를 지급하지 않는다(용역계약 일반조건 등 참조).

마. 추정공사비 예산 : 12,330,000,000원(VAT포함)

1) 제시된 예산액은 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기, 가스, 수도 등) 기반시설 인입 분담금, 전기안전 점검비, 각종 본인증 비용, 신재생에너지 설치 공사 등을 포함한다.

(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

2) 공사예정가격이 총사업비 조정결과의 공사비 예산을 초과할 수 없으며, 낙찰차액을 감안해서는 안된다.

3) 전체 사업 부지내 3개사업 계획으로 부지조성 및 각종 인프라 구축(도로, 상·하수도, 우수, 전기 등) 설계에 대해서는 각각 관계자(설계사, 발주처, 수요기관, 인허가 기관 등)와 상호 협의하여 적정한 대책 방안을 강구하여 공사비 구분 등 세부계획을 설계한다.

바. 설계 기간 : 착수일로부터 180일간 (공휴일 포함, 건축 인·허가 업무 포함)

1) 발주기관의 사정으로 의해 설계발주가 지연될 경우, 수급인은 본 과업내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독관(사업담당자)의 승인을 득하여 과업 기간을 변경할 수 있다.

가) 용역계약 일반조건 제19조(계약 기간의 연장)

나) 용역계약 일반조건 제24조(불가항력)

다) 용역계약 일반조건 제32조(기술용역의 일시 정지)

라) 용역계약 일반조건 제32조의2(계약상대자의 기술용역 정지 등)

마) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

2. 과업의 범위

가. 본 과업은 경찰청 장비보관시설 신축공사 실시설계용역에 적용한다.

나. 본 과업은 기존에 완성된 설계도서를 현 법령 등에 맞도록 보완하여 실시설계도서를 완료하고〔붙임1 참조〕, 건축협의 등 각종 인·허가에 필요한 서류작성 및 제출, 제반 협의, 실시계획의 인가 등 인·허가 처리(설계용역 성과물은 제반 인·허가를 득한 성과물이어야 함)를 포함한다.

※ 건축, 기계, 전기, 소방, 조경, 토목, 통신 등 제반 분야 일체의 비용 및 각종 인증, 예비인증(녹색건축, 제로에너지건축물, B·F 인증) 수수료 및 필요 추가 업무 비용(현황측량, 지열설비이용검토서 작성, 에너지 절약계획서 검토 수수료 등)을 포함한다.

다. 현황측량 및 지질조사실시

※ 현황측량 및 지질조사는 기존 지질조사도서를 참고하여 발주기관이 지정하는 토목공사업체 등과 협의하여 진행하며 필요한 경우 추가로 NX 1공을 실시할 수 있다. 단 기존 측량 및 조사결과는 동일하게 활용할 수 있는 경우에는 발주기관 승인하에 생략할 수 있다.

라. 본 과업은 녹색 건축 우수등급 이상의 예비인증 취득, 제로 에너지 건축물인증 4등급 이상, B·F 인증을 반영하여야 한다.

마. 지열 설계 시 시험 천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열 이용검토서를 작성 제출한다. 지열 설계는 물,공기 방식을 우선 고려한다.

※ 지열설비 이용검토서 작성 시 반드시 사전협의해야 함

바. 철거(이설)계획 및 철거(이설)공사 발주서류를 작성한다.

사. 지반 및 지장물 조사에서 폐기물 발견 시 지정폐기물(석면 등) 조사 및 성분검사 결과에 대한 비용은 별도 협의한다.

아. 건축법 의거, 내진설계 기타 관계 법령 등 기술(설계)용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

자. 인·허가 업무

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인·허가는 수급인이 대행하여야 한다.

2) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인·허가 관청을 방문·협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀하게 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결 조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진 계획을 작성하여 제출하여야 한다.

※ 각종 인·허가, 심의, 에너지 관련 계획서 제출 등 관계기관과 협의 후 관련 자료를 사전에 문서로 제출하고, 그 추진 계획을 설계 예정 공정표에 포함

3) 본 과업의 교통영향평가 등 각종 영향평가실시를 하는 경우 수급인은 평가대행업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극적으로 협조하여야 한다.

4) 수급인은 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성, 인장 날인 등 해당 발주기관의 업무에 적극적으로 협조하여야 한다.

5) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인·허가 (협의 사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관이 요청할 경우 적극적으로 협조하여야 한다.

차. 경계복원측량은 필요시 수행하며 관련 비용(수수료)은 발주기관과 협의한다. 또한, 필요시 필지 분할 및 분할측량(한국국토정보공사)은 추후 발주기관에서 제공하며, 그 외 설계에 필요한 모든 현황측량 및 수준측량은 계약상대자가 진행한다.

카. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 계약상대자의 협의하에 수행한다. 또한, 개정된 최신 관계법령을 적용한다.

타. 본 과업이 완료된 후 현장시공 단계에서의 설계상의 결함이나 수정사항이 발견되었을 때에는 계약상대자의 책임하에 즉시 보완·수정한다.

파. 본 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의에 따른다.

※ 사후정산(PS) 내역(부가가치세 별도) : 해당 용역은 준공 시 정산처리(하단 금액을 초과할 수 없음)하며, 계약상대자는 동 금액을 변경 없이 산출내역에 반영해야 함.

1. 지열설비이용검토서 작성비(시험천공, 열전도 테스트 등 포함) : 19,090,909원

2. 에너지절약계획서 검토 수수료 : 1,057,000원

3. 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 수수료 : 2,472,000원

4. 녹색건축 예비인증 수수료 : 7,256,000원

5. 제로 에너지 건축물 인증 수수료 : 5,900,000원

6. 설계안전성 검토 비용 수수료 : 2,000,000원

7. 설계안전보건대장 작성비용 : 2,500,000원

제2장  과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시 7일 이내에 다음 서류 3부를 제출한다.

1) 착수계(문서포함)

2) 책임기술자 선임계

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함)현황 및 명단

- 각 공종별(건축, 전기, 통신, 소방 등) 참여기술자 면허 및 자격증 사본, 건설기술진흥법에의한 경력증명서 등 제출

- 각 공종별(하도급 포함) 참여기술자 변경 시 즉시 승인 요청할 것

- 건설기술진흥법 제21조(건설기술자의 신고)에 따라 경력신고 시 명단포함 기술자만 인정 (착수계 제출 시 참여기술자가 실시설계까지 진행, 변경 시 승인요청)

4) 과업수행계획서

5) 설계용역수행 조직표(비상 연락망 제출)

6) 설계용역 예정공정표(계획, 실시설계의 납품 예정 일자 명시)

※붙임11(표준설계관리일정표)을 참고해 당해 사업특성에 맞게 조정하여 제출

7) 낙찰금액에 대한 산출 내역서(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

8) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황

9) 인력, 장비투입 예정현황

10) 보안각서(보안계획서 작성 포함)

11) 관련 서류를 포함한 USB

12) 기타 발주기관이 필요하다고 요구하는 사항

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수 회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 착수 회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 실시설계도서 납품(3단계 체크리스트 검토 결과 반영)

1) 실시설계 검사원[붙임 5]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 종결보고서

6) 건축협의서(제반 인·허가 증빙자료를 포함한다)

7) 설계검사원

8) 녹색 건축 예비인증서

9) 제로에너지건축물 예비인증서

10) 장애물 없는 생활환경 예비인증서

11) 손해배상보험증권(보증기간은 공사 완공일까지 산정)

12) 설계안전보건대장(산업안전보건법 제67조)

※ ｢산업안전보건법｣ 개정에 따라 설계자는 발주처에서 작성한 기본안전보건대장을 인계받아 설계안전보건대장 작성 후 감독관 확인을 받는다.

13) 설계안전성검토 보고서

14) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

15) 설계보완/실시설계/관계기관 협의도서 등의 모든 단계별 자료 포함된 USB

라. 기타 서류

1) 용역의 진도 보고(기술(설계)용역계약 특수조건 제8조)

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

3) 관계 법령 강화 및 신설에 따른 추가 서류 등은 발주기관과 협의 한다.

2. 업무보고 및 회의

※ 수급인은 설계 진행 시 정기적으로 설계 진행사항을 보고하여야 한다.

단, 보고 일정은 상황에 따라 발주기관과 협의하여 조정할 수 있다.

가. 업무보고

1) 수시보고 : 설계용역 진행 중 문제점 발생 시, 문제점을 분석하여 제출한다.

2) 최종보고 : 납품 5일 전 최종도면, 내역서, 성과품 등을 감독관의 검토 후 제출한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인이 설계 진행과 관련한 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우 책임기술자를 통하여 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정한다

다) 본 과업지시서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자를 통하여 회의 장소와 참석 범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석하도록 하여야 한다.

마) 수급인은 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수 회의

가) 업무 착수 회의는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무 착수 회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일 까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 설계에 사용하는 재료

1) 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 가지고 있는 것이어야 한다. 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정 사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주자와 협의 후 채택한다.

2) 인체에 유해 물질(예: 석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 아니 된다.

4. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제83조

2) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제13조

3) 조달청 시설공사 맞춤형 서비스 관급자재 선정 운영기준(조달청 훈령 제2105호)

나. 수급인은 상기 규정에 의거 해당하는 자재목록 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

5. 에너지 절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2020-197호)

2) 건축물의 에너지 절약 설계기준(국토교통부 고시 제2024-421호)

3) 제로에너지건축물 인증 기준(국토교통부 고시 제2023-911호, 산업통상자원부 고시 제2023-242호)

4) 녹색 건축 인증기준(국토교통부 고시 제2021-278호)

5) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. ‘건축물의 에너지 절약 설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 에너지 절약 사전 협의실시

다. 건축물 제로에너지 건축물인증 및 녹색 건축 인증 우수등급 이상의 예비인증을 취득하여야 하며, 취득에 필요한 수수료 및 기타비용(컨설팅비용 등)은 수급인이 부담한다.

라. 신·재생 에너지 설치 관련 관공서 설치 의무비율에 맞도록 설계하여야 한다.

6. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 본 설계용역 목적 이외에 개인 또는 특정 단체의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.

※ 착수계 제출 시 설계 참여 관련자 전원 보안각서 첨부

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사, 외부로 유출 시켜서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각 대장을 제출하여야 한다.

3) 수급인은 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생 되는 모든 책임은 수급인이 진다.

4) 기밀의 자료를 제공받는 경우에는 이를 참고 후 즉시 반납하여야 한다.

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행은 건축법, 녹색건축물 조성지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통촉진법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배 되지 않도록 하여야 한다.

나. 수급인은 본 과업지시서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보(관련 근거 제시) 하여 협의 후 설계를 진행한다.

다. 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신, 인테리어, 폐기물 처리 등 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반 규정 및 본 지시서의 기준 이상으로 한다.

라. 본 과업 관련 특기 사항

1) 신축 대상 부지에 위치하는 (구)농업과학연구소 건물 철거 계획 및 소요예산을 병행하여 설계에 반영하고, (구)농업과학연구소 철거 관련 폐기물 처리계획을 수립한다.

마. 기타 수요기관 요구사항 반영

바. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반할 경우 용역계약 일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 수급인은 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량 누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생 되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자 내용이 보완될 때까지 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생 되거나 중대한 설계 과오로 판단될 경우 관계 법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2. 설계 용역 일반 지침

가. 기본 지침

1) 납품은 수정사항을 반영한 전체 설계도서로 납품한다.

2) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의 사항에 적극적으로 협조 (답변서 제출등)하여야 한다.

3) 발주기관의 사정으로 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

4) 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축 가능 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있는 경우에는 이에 관한 내용을 관련 기관과 문서로 협의하고 설계 기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

5) 건축법 시행령 제91조의3(관계 전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계 전문기술자의 협력 사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

6) ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’, ‘건축물의 에너지 절약 설계기준’ 등 제반 규정을 준수하고, 창호, 내·외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍·방한·단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 하며, 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 시스템으로 설계하여 고효율 자재를 사용하여야 한다.

3. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 인테리어 포함), 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다(도면, 내역서, 일위대가, 수량산출기초 등). 단, 발주단위에 대하여는 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축폐기물 처리도서는 분리발주가 가능하도록 작성하여야 한다.

4. 설계도서의 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약 일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (기계소방 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

8) 인테리어도면 : I

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 해당 공사의 명확한 구분.

2) 특수공법인 경우 시공방법을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성.

3) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부.

4) 수량산출서 작성 시 도면과 함께 층별 검토가 가능하도록 할 것.

5. 도면작성

가. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 하나, 발주기관과 협의하여 A3 규격을 사용할 수 있다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주기관의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명·날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여 기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성할 때 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용 자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우 공인기관 기술검토서 첨부

6. 관계기관 업무협의

가. 각종 인·허가, 심의, 건축협의(허가) 신청, 에너지절약계획서 제출, 신재생에너지 설치계획서 제출 등 관계기관과의 공식적 업무 시 관련 자료를 사전에 발주기관과 협의하고, 최종 결과를 문서로 제출한다.

나. 관계기관과의 공식적인 일정은 설계예정공정표에 표기한다.

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통사항

1) 일반사항

(1) 설계도서는 관련 법규와 제반 규정 및 본 과업내용서의 설계지침에서 제시한 기준 이상으로 한다. 특히, 건축법 시행규칙의 설계도서 내용 및 작성기준을 적용하여 작성하되 구체적으로 명시되지 아니한 부분은 발주자와 협의하여 작성한다.

(2) 설계도면은 자격 있는 기술자가 작성하여야 하고 각종 허가 및 협의 시에는 건축법규에 의한 건축사의 서명날인이 있어야 한다.

(3) 설계도면 작성 시 각종 시공 상세도는 현장기능공이 쉽게 이해할 수 있는 수준으로 작성하여야 한다.

2) 설계도서 용지 및 규격

(1) 작도용지 및 규격

- 작도용 원도는 영구보관에 지장이 없는 양질의 것을 사용하며, 규격은 건물 규모에 맞추어 건축사가 결정하되 납품도서 목록을 기준 한다.

(2) 기입 치수 및 단위

- 설계도서에 사용되는 단위는 MKSA 규준에 따르되 길이의 단위는 mm를 사용함을 원칙으로 한다.

(3) 표기는 한글 사용을 원칙으로 하되 한문이나 영문으로 병기 할 수 있으며, 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

(4) 축척은 동일 종류에 대하여는 가능한 한 통일시키며 건축법 시행규칙을 준용한다.

(5) 설계도면 수정 시는 수정 부분 위치나 내용을 표시한다.

(6) 각 공사마다 도면, 목록을 작성하고 방향 표시, 단면표시, 상세표시 및 보기를 넣어 해당 부분을 쉽게 찾아볼 수 있도록 한다.

(7) 설계도면을 작성함에 있어 각종 상세도면을 충분히 작성하여 적산 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

3) 설계설명서 작성요령

(1) 시설별, 공종별로 구분하여 계통구성 및 주요 구성요소 등의 중요내용을 객관적으로 서술하여 작성한다.

(2) 관련 법규에서 규정한 내용에 대한 충족 여부를 명확하게 제시하여야 한다.

(3) 참여기술자의 분야별 명세서와 담당업무를 명확히 명기하고 서명하여야 한다.

4) 시방서 작성요령

(1) 공사표준 시방서, 특기시방서, 자재시방서 : 건축(구조, 부대시설 포함), 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등으로 구분하여 작성한다.

(2) 표준시방서는 각 공종별로 기록하되 설계개요, 인허가 사항 및 일반적인 공사의 시행 방법 등을 기록한다.

(3) 특기시방서는 표준시방서에 포함되지 않는 구조, 규격, 특성 시험내용 및 방법과 타 공사와의 시공 한계를 명확하게 구분하여 기술한다.

(4) 자재시방서는 사용재료의 규격, 품질, 색상, 질감 등과 재료 시험방법 및 재료 선정 시험 등의 내용을 기록한다.

(5) 시방서는 도면과 내역에 반영된 사항과 상호 모순이 없고 설계도서 상호간 일치되어야 한다.

5) 내역서 작성요령

(1) 내역서 작성에 있어서 설계 수량은 건설공사 표준품셈을 기준하고, 원가계산은 회계예규 “원가계산에 의한 예정가격 작성준칙”을 기준으로 정확하게 산출하여 내역서를 작성·납품하여야 하며 사용 자재의 코드는 시설 자재 코드(11자리)를 사용하여야 한다.

(2) 내역서는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등으로 구분하여 작성한다.

(3) 품셈은 정부표준 품셈을 적용하는 것을 원칙으로 하고, 이에 의거 산출할 수 없는 것은 적산 참고자료 등 근거로 제시하도록 한다.

(4) 자재 단가는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 (단위당 가격의 기준)을 적용하는 것을 원칙으로 하며, 노임은 대한건설협회에서 조사한 시중 노임 단가를 적용한다.

제5장 설계도서 납품목록

1. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종						비 고
					건축	토목	조경	기계	통신	소방
1	실시설계 검사원	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	종결보고서	A4	3	부	통합본
3	설계설명서	A4	3	부	통합본						- 색채계획 포함
4	설계도면	A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 에너지절약계획서 포함 - 반접이
		A3	5
5	각종 계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서(도급/관급)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	일위대가/단가산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 견적서 포함
9	표준시방서(국토부)/ 특기시방서/관급시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	* 조달청홈페이지→ 정보제공 → 업무별 자료 → 시설공사게시판
10	조감도(파일포함)	-	3	부	◯						- A1 이상(추후협의) 표구포함(추후협의)
11	공사예정공정표	-	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 도면에 포함 전 공종 포함
12	건축협의(허가)서	-	2	부							- 신청 전 문서 제출 - 완료 후 예비인중서 포함
13	실시계획인가협조자료 (필요시)	-	2	부
14	공사계약요청 자료	공사원가계산서(총차/금차예산), 관급자재목록, 공사원가계산서(모두excel file), 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등 * 공사개요, 현장설명서 포함
15	자재 견본서	A4	2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 제품명, 색상, 규격 등 포함
16	공사예정공정표	-	3	부
17	설계안전보건대장	A4	3	부
18	현장설명서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
19	에너지 절약 계획서 관련 증빙서류										3부
20	녹색건축 예비인증, 제로에너지건축물 예비인증을 위한 제출도서 및 최종 인증서
21	장애물 없는 생활환경 예비인증을 위한 제출도서 및 인증서
22	설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항 검토서 등
23	손해배상보험증권	A4	3	부
24	설계변경 환류자료 및 하자DB자료 검토서	-	2	부							- 조달청 홈페이지 참조
25	DVD(USB) or USB	-	10	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	- 계획/중간/실시/각종심의/인허가관려/문서/회의록/각종발표자료 등 포함
26	기타 발주기관 요구사항, 체크리스트	각 단계별 도서파일(USB) 등

※ 최종성과물 제출 시 계획설계부터 실시설계 과정의 모든 자료 포함하여 1장으로 제작

※ 제출도서는 발주청과 협의하여 변경 가능

1. 폐기물처리용역도서는 관련 규정에 의거 분리발주로 별도 제작하여 제출.

- 수량산출서, 내역서(단위 : ton, 환산 식 포함 할 것)

2. 내역서 : 내역프로그램 결과물, 엑셀, 조달청 호환 변환 파일 모두 함께 제출.

3. 도서수량 및 세부내용은 납품 시 발주기관과 협의하여 조정할 것.

4. 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5매와 원본 File을 USB로 제출.

※ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출.

5. 설계변경 환류자료 및 하자DB자료

6. 설계도서(시방서, 계산서, 지반조사보고서, 내역서, 도면 등)는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의한 시설물관리대장을 FMS 등록을 위해 ‘시설물통합정보관리체계 운영규정’의 제출형식, 구성파일 및 색인파일 내용 등에 따라 제출

나. 종결보고서 : 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 냉난방시스템/대체에너지설비 선정사유 및 검토내용, 각종자재의 선정사유 및 사용계획서, 색채 사용계획서, 사토장 조사 보고서, 에너지 절약 계획서, 납품 설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격 책자로 양면 인쇄하고 좌철하여 제출.

다. 공정표 : 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 작성하여 제출.

※ 출력물은 3부(A1 1부, A3 2부)를 제출하고 USB에 포함.

라. 공사예정공정표

1) 각 공종 간의 간섭사항을 검토 후 공정계획을 수립 및 공사기간을 산정(절대공기, 근로기준법 개정사항 반영)하고 공사량과 주변 현장환경에 맞게 작성하여 제출한다.

2) 공사비 예산배정 현황 또한 고려하며, 지열공사와 같이 별도의 관급(수의)계약으로 진행되는 공종은 그 책임기술자에게 확인을 받아 공정표에 산입하여 주공종에 간섭이 발생하지 않도록 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) 3부.

마. 관급자재 품목은 공정별로 시방서, 내역서, 설계도면 등 필요한 서류를 첨부, 편철.

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등).

사. 기타 발주기관이 요구하는 성과품.  끝.

〔붙임 1〕 설계보완 주요 검토사항

○ 건축 구조 분야

항목	검토내용	관련법	수정대상 도면
재료강도	콘크리트강도 상향 24→27~30㎫	KDS 14 20 40 콘크리트내 구성기준 2019년 개정	재설계(전체동)
재료강도	철골 설계기준강도 변경 Fy=234㎫→fy=275㎫	KDS 41 31 2019년 개정	표기 변경
지반 분류	최신지반분류 체계로 변경	KDS 41 내진설계기준 2019년 개정	재설계(전체동)
풍하중	지역별 기본풍속 변경 (SC,SD→S3,S4)	풍하중 관련 2022년 개정	재설계(전체동)
지진하중	지하 내진설계 실시	KDS 41 2019년 개정	재설계(전체동)
설계기준	최신기준 적용	2016년당시 KBC2009를 현재 KDS 14 및 41적용	재설계(전체동)

○ 건축 일반 분야

항목	검토내용	관련법	수정대상 도면
구조내력 등	2층 이상 200㎡ 이상 건축물에 해당	건축법시행령 제32조	구조도면 전면 재설계로 건축도면 수정 불가피
건축물의 구조내력 공개	2층 이상 200㎡ 이상 건축물에 해당	건축법 제48조의 3	구조도면 전면 재설계로 건축도면 수정 불가피
직통계단의 설치	지하층 거실의 바닥면적 200㎡이상	건축법시행령 제34조의 2	건축도면 수정 필요
층간 방화구획	매층마다 구획필요	건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조	건축도면 수정 필요
소방관 진입창 설치	11층 이하 소방관 진입창 설치와 식별표시	건축법시행령 제51조	건축도면 창호디자인 수정
설계안전성 검토	가설구조물, 5m높이 거푸집 및 동바리 등	건설기술진흥법시행령 제75조의2	건축도면 수정 필요 용역업체 업무지원 필요
설계경제성 등 검토(VE)	총공사비 100억이상	건설기술진흥법시행령 제75조	기본 및 실시설계 VE필요(도면 수정 필요)

○ 토목 분야

항목	검토내용	관련법	수정대상 도면
지반조사	내진설계를위한 지반등급	KBC2016지반등급 분류기준 변경	지반등급산정용 추가지반공사(1공)를 수행하거나 기존지반조사보고서 지반등급분류기준 변경
우수계획	우수 수리 재검토	광주시 하수도정비기본계획
오수계획 급수계획	지하매설물 현황조사 필요	오수: 대상지 주변 기반시설 확인 급수: 대상지 주변 기반시설 확인 협의건축물 협의에 따른 보완촉구 통지 공문 확인 급수인입관련 도로굴착 심의대상 여부 확인	급수, 우수, 오수계획 관련도서 1식
빗물저류조	∙친환경분야에서 빗 물저류조설치기준 확인 필요

○ 기계 분야

항목	검토내용	관련법	수정대상 도면
장비	급수펌프 검토필요		도면 수정
위생기구	위생기구별 급수 사용량에 따른 절수등급 표시	절수설비에 대한 절수등급표시 의무화(제15조)	도면 수정
낸난방	냉난방기 검토필요		도면 수정
보온재	표준시방변경으로 도면 및 내역서 변경	기계설비표준시방서 2021년 2월 개정	도면 수정

○ 기계소방 분야

항목	검토내용	관련법	수정대상 도면
소화펌프	소화펌프 임펠러, 펌프축 재질변경	스프링클러설비의 화재안전 성능기준(NFPC103)	도면 수정
소화내진설계	기존 설치된 외국제품을 국내제품으로 변경		도면 수정
소화배관 접합	최근 화재방지이유로 그로브조인트 사용		내역서

○ 전기소방 분야

항목	검토내용	관련법	수정대상 도면
소방전기 시방서	개정된 규정에 따라 재작성	전기설비기술기준 제4조 한국전기설비규정(KEC)	신규 작성
소방시설 설치계획표	소방시설 설치계획표 누락	소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제3조	신규 작성
소방설비 간선	소방배선 변경: -내열전선 변경 필요	소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제11조	도면 수정
자동화재탐지설비	업무시설 자동화재탐지설비 설비제외 가능	소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제11조	도면 수정
유도등 설비	유도등 설치 수량 축소	유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303)	도면 수정

○ 통신 분야

항목	검토내용	관련법	수정대상 도면
설계계산서	설계계산서 누락 TV전계강도 계산서 트레이 계산서	방송 공동수신설비의 설치 기준에 관한 고시 제22조	신규 작성
통합배선설비	구내통신 회선수 확보 접지방식 변경	방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제17조	도면 수정
구내용 이동통신설비	구내용 이동통신설비 반영 필요	방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 제17조의 2	신규 작성

○ 전기 분야

항목	검토내용	관련법	수정대상 도면
설계계산서	설계계산서 누락 공사계획인가 시 필요 : 접지계산서 등 사용전 검사시 필요 : 전압강하계산서, 부하계산서, 발전기용량계산서 등	전기설비검사 및 점검의 방법· 절차등에 관한 고시 전기설비기술기준 제4조 한국전기설비규정(KEC)	신규 작성
전기시방서	개정된 규정에 따라 재작성	전기설비기술기준 제4조 한국전기설비규정(KEC)	신규 작성
단선결선도	1000㎾미만 수용가 저압수전 검토 필요	한전 기본공급약관 제 23조	도면 수정
옥외전력 간선 배치도	설치공간 확보 검토 필요	건축물의설비기준등에 관한 규칙 제20조	도면 수정
부하계산서 및 단선결선도	개정된 규정에 따른 일반동력부하 차단기 재선정 필요	전기설비기술기준 제4조 한국전기설비규정(KEC)	도면 수정
분전반 상세도	개정된 규정에 따른 과전류 차단기 재선정 필요	전기설비기술기준 제4조 한국전기설비규정(KEC)	도면 수정
전력 간선	개정된 전압강하 규정에 따른 간선굵기 재계산 필요	전기설비기술기준 제4조 한국전기설비규정(KEC)	도면 수정
전등설비	개정된 규정에 따른 배관공법 변경 필요	전기설비기술기준 제4조 한국전기설비규정(KEC)	도면 수정
접지설비	개정된 규정에 따른 접지공법 변경 필요	전기설비기술기준 제4조 한국전기설비규정(KEC)	도면 수정
트레이설비	건축물구조부재 관통설비에 대한 내화설비적용 필요	전기설비검사 및 점검의 방법· 절차등에 관한 고시	도면 수정
태양광 발전설비	공공기관 신재생에너지 공급 의무비율 기준적용 필요	신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제12조	도면 수정
전기차 충전시설	공공기관 환경친화적 자동차 충전 설치 적용 필요	환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정 제16조	신규 작성
에너지절약 계획서	에너지성능지표 EP1 점수확보 필요(공공기관 기준)	건축물의 에너지절약설계기준	신규 작성

○ 친환경 분야

항목	검토내용	관련법	수정대상 도면
건물에너지효율등급/제로에너지건축물인증	공공업무시설이므로 인증 대상건축물	건축물 에너지효율등급 인 증 및 제로에너지건축물 인 증에 관한 규칙 제2조	반영사항 -신재생 -원격검침시스템
녹색건축인증		녹색건축물 조성 지원법 시 행령 제11조의3	건축, 조경, 토목, 전기, 기계 등 첨부파일 참조
장애물없는 생활인증 (BF)		장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 [별표1	건축, 조경, 토목, 전기 등
신재생에너지	2023년 32%기준으로 수정 2024년 허가 접수시 34%	신에너지 및 재생에너지 개 발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 시 행령 [별표2]	태양광 관련도서
에너지절약 계획서	-2023년 단열기준으로 단 열재 종류 및 두께 변경 -2023년 성능지표 74점 만 족하기위해 건축, 기계 ,전 기 배점 확보	건축물의 에너지절약설계 기준	단열 계획도 건축, 기계, 전기 도면

※ 위 검토사항을 참고하여 기존 설계도서를 수정하되, 상기 누락된 보완사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 개정된 최신 법령에 맞도록 실시설계도서를 완성한다.

[붙임 2] 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 경찰청 장비보관시설 신축사업 실시설계용역

2. 계 약 일 자 :

3. 착 수 일 자 :

4. 완수예정일 :

본인은 상기 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약 일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행 기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유·무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안 관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약 특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주기관에게 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202 .   .   .

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여 공종 표기

성        명 :                   (인)

경찰청장 귀하

[붙임 3] 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 경찰청 장비보관시설 신축사업 실시설계용역

2. 계 약 금 액 :

3. 계 약 일 자 :

4. 착 수 일 자 :

5. 완수예정일 :

-  아         래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

202 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경찰청장 귀하

[붙임 4] 하도급 승인 요청서

하 도 급 승 인  요 청 서

1. 용  역  명 :

2. 계 약 금 액 :

3. 계 약 일 자 :

4. 착 수 일 자 :

5. 완수예정일 :

-  아         래  -

가. 하도급분야 :

나. 하도급금액 :

다. 하 도 급 자

- 주      소 :

- 상      호 :

- 대  표  자 :

- 보 유 면 허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동 주체 신고증 등) 사본 1부

2. 하도급 계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게 ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오며 기술용역계약 특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202 .   .   .

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

경찰청장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관 계 규 정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조 (기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조 (기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링 진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업기본법 시행규칙 제27조의 2
하도급 사유		건축법 제67조 (관계전문기술자) 기술용역(설계)계약특수조건 제5조

[붙임 5] (기본, 중간, 실시) 설계검사원

(기 본, 중 간, 실 시) 설 계  검 사 원

1. 용  역  명 : 경찰청 장비보관시설 신축사업 실시설계용역

2. 계 약 금 액 :

3. 계 약 일 자 :

4. 착 수 일 자 :

5. 완수예정일 :

붙임 : 납품설계도서 목록 1부

상기와 같이 (기본, 중간, 실시) 설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 .   .   .

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

경찰청장 귀하

[붙임 6] 주간공정보고 삭제

[붙임 7] 월간공정보고 삭제

[붙임 8] 현장조사 체크리스트 삭제

[붙임 9] Space Program

□ 시설규모 공간구성 (7개동)

용도별	시설명		소요면적(㎡)	산출근거	비 고
위험물 저장시설 (3개동)	무기고		1,512	72㎡(2,260정당)×21	국방·군사시설기준
	탄약고	탄약고	575	23㎡(584,640발)×25	국방·군사시설기준
		고폭탄고	23	23㎡(5,880발)×1	국방·군사시설기준
	화학고		330	현재사용면적:330.0㎡	실소요 반영
	소 계		2,440
업무시설 (정비동) (지상1층/ 지하1층)	무기실험실		240	4개 사로(총기실험) 240㎡	실소요 반영
	정비(실습)실		180	정비(실습)공간 180㎡	실소요 반영
	부속품 창고		300	현재사용면적:300.5㎡	실소요 반영
	소 계		720
업무,편의 정보통신 시설 (사무동) (지상2층/ 지하1층)	순사무실		20	특수기관장:1명×20㎡	경찰청사시설기준
			35	사무실:5명×7㎡
			42	사무실:6명×7㎡
	상황실		20	당직인원:2명×10㎡
	회의실		100	직원:50명 미만 50㎡×2개소
	휴게실		35.8	24인 미만 기준 적용×2개소
	문서고 및 비품 창고		19.6	순사무실면적(97㎡)×7% ×3개소
	통신 및 전산장비실		15	장비:1조×5㎡ 전산기수:2식×5㎡	법무시설기준
	소 계		287.4
차고동 (별동)	차 고		79.6	대형차:4대	경찰청사시설기준
안내소 (별동)	정문 안내소		6	근무자:2명×3㎡
공용공간	홀, 화장실, 계단실 등 공용공간		1,152	산출면적의 30%
			100	기계실:5,000㎡ 이하
	기계/전기/발전기실		50	전기실:30,000㎡ 이하
			50	발전기실:30,000㎡ 이하
	소 계		1,431.6
전 용 면 적 계			3,733
공용시설	공유시설		1,152	산출면적의 30% 추가
공 용 면 적 계			1,152
합 계 (+)			4,885
옥외주차장			500	화물차:25대×20㎡	면적합계제외

※ 상기 Space Program은 계획안으로 설계진행시 발주기관과 협의 확정하여 설계하여야 한다.

[붙임 10] 경찰청 장비보관시설 부지 요도

장비보관시설 부지 요도

소   재 : 경기광주시 도척면 진우리 40-6 및 40-1 일대

경찰청 장비보관시설

예정 부지

※ 경기청 통합숙영시설 전체배치도 및 경찰청 장비보관시설 위치

[붙임 11] 표준 설계관리 일정표

표준 설계관리 일정표 (기타공사 / 180일(6개월)기준)
구분		1개월						2개월						3개월						4개월						5개월						6개월
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
주공정		설계도서파악 및 도면작성			도서보완 및 법률검토			설계																								인허가
주요업무일정		착수계 제출				관급자재심의																	설계중간점검									도서납품 및 인허가 준비
				착수회의		도면검토
설계	건축	설계도서 검토			도서보완 및 법률검토			설계 도면 및 내역서 작성
																							도서보완 및 인허가 준비
	구조	설계도서 검토			도서보완 및 법률검토			설계 도면 및 내역서 작성
																							도서보완 및 인허가 준비
	토목	설계도서 검토			도서보완 및 법률검토			설계 도면 및 내역서 작성
																							도서보완 및 인허가 준비
	기계	설계도서 검토			도서보완 및 법률검토			설계 도면 및 내역서 작성
																							도서보완 및 인허가 준비
	전기,통신,소방	설계도서 검토			도서보완 및 법률검토			설계 도면 및 내역서 작성
																							도서보완 및 인허가 준비