- 국토안전관리원 인재교육원 건립공사 건축설계 용역 -

과업내용서

2022. 10.

						목 차

Ⅰ. 과업의 개요	1

Ⅱ. 과업의 내용	10

Ⅲ. 설계도서 작성기준	23

Ⅳ. 분야별 설계지침	30

Ⅴ. 설계도서 작성요령	45

Ⅵ. 설계도서 납품목록	66

Ⅶ. 붙임	70

Ⅰ. 과업의 개요
국토안전관리원 인재교육원 건립공사 건축설계 용역
	1. 과업명칭 2. 과업개요 3. 과업기간 4. 과업범위 5. 일반사항

I		과업의 개요

1. 과업명칭

ㅇ 국토안전관리원 인재교육원 건립공사 건축설계 용역

2. 과업개요

가.  위치 : 경상북도 김천시 율곡동 1100, 1101, 1102(3필지)

나.  대지면적 : 18,202.2㎡

다. 연면적 : 8,024㎡[±3% 내외 조정 가능(규모 변경시 발주기관과 협의)]

1) 교육시설, 체험시설 및 실습시설로 구성될 예정이며, 8,024㎡는 교육시설 및 체험시설의 연면적임

2) 실습시설은 과업내용서 [붙임 1]을 참조하여 실습시설 공사비를 초과하지 않는 범위 내에서 발주기관과 협의 및 결정

라.  공사비 예산 : 29,694,000,000원(VAT 포함)

1) 건축, 실내건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 연약지반 보강, 철거, BEMS, 신재생에너지, 폐기물처리비, 인입비(전기, 가스, 수도 등), 관급자재비 및 각종 분담금 등을 포함하며, 낙찰차액을 감안해서는 안됨(공사예정가격이 예산을 초과할 수 없음)

2) 구성 : 교육시설 및 체험시설 공사비 26,134,000,000원
실습시설 공사비 3,560,000,000원

마.  설계비 : 1,346,000,000원(VAT 포함)

1) 건축, 실내건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거, BEMS 등의 기본 및 실시설계비

2) 폐기물, 각종 인·허가, 예비인증(에너지효율등급, 제로에너지건축물, 녹색건축물, BF), 신재생에너지, 설계안전성검토 및 건축협의(건축물대장 생성 등) 등 제반 행정절차 이행 및 관련 비용 포함

3) 사전조사(지반조사, 현황측량) 비용, 예비인증(에너지효율등급, 제로에너지건축물, 녹색건축물, BF) 수수료, 신재생에너지 관련 조사·인증비 및 손해배상공제비 포함

4) 설계 적정성 검토 및 설계 경제성 검토 수수료 제외

바. 공간계획 및 시설조건 : [붙임 1] 참조

- 실습구조물(건축·토목)의 규모와 환경조건은 [붙임 1]에 따르되, 구체적인 사항은 발주기관의 의견을 수렴하여 협의 및 조정

3. 과업기간 : 착수일로부터 240일(공휴일 포함)

가.  용역 결과물 납품 후라도 본 용역과 관련하여 관련규정 위반 또는 설계 미비 등 하자가 발생하여 변경이 필요할 경우에는 그 내용이 완료될 때까지 계약자 부담으로 변경작업을 수행하여야 한다.

나.  다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 득하여 과업수행기간을 변경할 수 있다.

1)  천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 과업수행이 중단되었을 경우

2)  발주기관의 방침에 의하여 과업수행이 중단되었을 경우

3)  발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

4)  기타 발주기관이 정당하다고 인정할 수 있는 사유가 발생할 경우

4. 과업범위

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 실시계획의 인가 등을 포함한 인허가 처리 시까지 업무 일체를 포함한다.

1) 설계용역 성과물은 제반 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다.

2) 건축, 실내건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 제반분야 일체의 비용을 포함한다.

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문·심의, 영향평가 등에 대한 업무에 협조하여야 한다.

- 본 설계용역이 완료된 후라도 입찰방법 심의 등에 따른 서류보완이 필요할 경우 발주기관의 요청에 적극 협조하여야 한다.

다. 현황 측량과 지질 조사(NX 5공)를 실시하여야 한다.

라. 제로에너지건축물 5등급, 건축물 에너지효율 1++등급, 녹색건축 일반등급 및 장애물 없는 생활환경 예비인증을 취득하여야 하며, 본인증시 예비인증 도서 제공 등 업무지원을 하여야 한다.

마.  에너지절약계획서 및 신·재생에너지 설비 설치계획서를 작성 및 제출하고, 검토 결과를 설계에 반영하여야 한다.

- 신·재생에너지로 지열 설계시 시험천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서를 제출하여야 한다.

바.  범죄예방(CPTED) 기법 「범죄예방 건축기준 고시(국토교통부고시)」를 준수하여야 한다.

사.  안전 관련 설계업무를 수행하여야 한다.

1) 위험도, 주말 및 공휴일작업, 야간작업, 기상조건 등 고려하여 공사기간을 산정하고, 관련법규 및 지침에 따른 적정 산업안전보건관리비 및 안전관리비를 산출하고 구체적인 산출내역서를 제출하여야 한다.

2) 산업안전보건법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 따라 설계안전보건대장을 작성하고 공사 중·준공 후 안전을 고려하여 설계도서를 작성하여야 한다.

3) 건설기술 진흥법 시행령 제75조의2(설계의 안전성 검토)에 따라 설계 안전성 검토 보고서 작성 등 관련 업무를 수행하여야 한다.

아.  발주기관이 실시하는 설계의 적정성 검토 및 설계의 경제성 등 검토(VE) 업무에 적극 협조하고, 검토 결과를 설계에 반영하여야 한다.

자. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 설명회 발표자료 작성 및 조치사항 설계도서 반영을 수행하여야 한다.

차. 인허가 업무를 수행하여야 한다.

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인허가는 설계자가 대행하여야 한다.

2) 설계자는 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문·협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 본 과업의 사전재해영향성평가, 교통영향평가 등 각종 영향평가, 도시계획시설결정(변경) 및 실시계획의 인가를 실시할 경우 설계자는 각종 용역업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조하여야 한다 (인허가관련 각종 용역 필요 여부 검토 포함).

4) 설계자는 향후 사용승인 신청시 준공도서 작성, 인장날인 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

5) 설계자는 건립공사 준공 시까지 건축서비스산업 진흥법 제22조(설계의도 구현)과 관련된 다음의 업무에 대해 적극 협조하여야 한다.

- 설계도서의 해석·자문, 설계변경 검토의견, 각종 자재와 장비의 치수·위치·재질·질감·색상 등의 선정과 변경에 대한 검토·보완 등(요청 시 공사현장 방문 포함)

- 현장여건에 따라 발생하는 설계변경(기초구조 변경 등) 등의 추가 설계도서 작성·검토·날인 및 필요시 인허가 변경업무

- 건축물 사용승인에 따른 업무(준공도서 작성 및 인장날인 등)

카. 설계자는 국토안전관리원 임직원의 의견을 수렴해야 하며, 임직원 요구사항을 분석하여 달성 방안을 제시하고 실행계획을 설계에 반영하여야 한다.

타. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 설계자의 협의 하에 수행한다.

5. 일반사항

가. 발주기관, 설계자의 책임 및 의무

1) 설계자는 건설공사의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업 계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

2) 설계자가 각종 계획이나 결과에 대하여 승인을 요청한 경우 발주기관은 최대한 빠른 시일 내에 결정하여 설계자에게 통지하여야 한다.

3) 설계자는 발주기관의 승인 없이 과업의 범위를 변경할 수 없다.

4) 설계자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계 용역의 각 단계별 성과품을 작성하며 그에 대해 총체적 책임을 진다.

5) 설계자는 관련 법규와 계약조건, 발주기관의 요구조건을 만족하는 설계를 하여야 한다. 만약 설계용역의 시행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 설계자는 발주기관에게 보고할 책임이 있으며, 관련 법령 및 계약서 검토, 발주기관과의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색하여야 한다.

6) 발주기관은 설계 용역과 관련하여 필요한 자료를 설계자가 이용할 수 있도록 적극 협조하여야 하며, 설계자는 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에 알려야 한다.

7) 설계자는 모든 설계도서에 대지의 현 상황과 실제 조건을 정확하게 표시하고 반영하여야 한다.

8) 설계 추진과정에서 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 각 공종별 설계담당자는 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용이 서로 달라 문제점이 발생하지 않도록 만전을 기하여야 한다.

9) 설계자는 내·외부 주요시설과 옥내·외 Sign 등에 대한 실내건축 설계 방향 설정 및 세부계획을 수립하여 실내건축 설계를 하여야 하며, 계획·중간·실시설계 단계별로 발주기관에 보고·협의하여 결정하여야 한다. 또한 재료의 지정색 및 질감은 주변 환경, 전체적인 색채 및 의장 디자인과 조화가 이루어지도록 계획한다.

- 실내건축 설계가 필요한 실 : 로비, ELEV홀, 원장실, 회의실, 강당, 식당, 카페테리아, 비즈니스룸 등

10) 설계자는 용역 종료 후 공사 진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 자신의 비용으로 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

11) 설계자는 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)해야 한다.

12) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 적극적으로 협조해야 한다.

13) 설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하여야 하고, 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

14) 건축법 시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따라 해당 관계법에서 정하는 기술인의 협력을 받아야 한다.

15) 사업수행과정에서 법령 등에 의거 당연히 시행되어야 하는 업무는 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 보며, 관련법령에 적합하고 필요한 행정적·법적 절차를 고려하여 적용하여야 한다.

나. 주요업무의 사전승인

- 설계자는 다음 사항에 대하여 발주기관과 사전에 협의하여 과업을 수행한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서 내용 변경

2) 주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 관계기관과의 협의사항

4) 용역수행자의 교체

5) 설계기준의 설정 또는 변경

6) 하도급 및 관계전문기술인의 협력

7) 현황측량 및 지질조사 계획

8) 기타 발주기관의 지시나 설계자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

다. 과업의 변경 등

1) 본 과업수행 중 발주기관의 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경사항이 발생될 경우에 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산 처리하거나 과업의 범위를 조정·변경할 수 있다.

2) 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 설계자의 기술용역 정지, 기술용역의 이행 보증 등은 기획재정부 계약예규 용역계약 일반조건에 따른다.

3) 공사비가 증액되더라도 그에 대한 설계비의 증액은 없다.

라. 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술인은 성실한 자세로 용역을 수행하여야 하며, 발주기관은 용역에 참여하는 기술인 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우에 용역수행자(하도급자 포함)의 교체를 요구할 수 있으며 설계자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따른다.

2) 과업에 참여하는 기술인이 퇴직 또는 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등 이상의 등급·경력을 갖춘 기술인으로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다. 교체 시에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 교체 기술인의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 설계자에게 있다.

3) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관에 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

마. 용어의 해석

- 과업내용서의 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 설계자가 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

바. 보안 및 비밀 유지

1) 보안 관계 법규의 준수

설계자는 보안 관련 법령 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의의 의무를 다하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 설계자가 지도록 한다.

2) 과업성과품 발간 시 유의사항

설계자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 발주기관과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류·관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

사. 대금 지급

- 설계 단계별 납품 및 검수완료 후 설계자의 청구에 의하여 용역대금을 다음의 비율에 따라 순차적으로 지급한다.

구 분	지급비율
계획설계	20%
중간설계	30%
실시설계	50%

Ⅱ. 과업의 내용
국토안전관리원 청사 건립공사 건축설계 용역
	설계자의 업무기준(의무) 2. 과업수행 단계별 제출서류 3. 업무보고 및 회의 4. 관급자재의 선정 5. 에너지절약형 건축물 설계 6. 설계의 적정성 및 경제성 등 검토(VE) 7. 보안성 검토 및 비밀유지 8. 설계진행 시 유의사항 9. 하도급 관리

Ⅱ		과업의 내용

1. 설계자의 업무기준(의무)

가. 설계용역 착수와 동시에 용역관계자는 설계용역의 목적과 과업내용을 충분히 숙지하여야 하며, 본 과업내용서 외에 관련 법령 및 각종 시행기준을 준수하여야 한다.

나. 설계자는 치수, 재료, 건물 구성요소의 설치와 관련하여 현재 건설 산업에서 사용하고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

다. 설계자는 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 한다.

라. 설계자는 용역 수행시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의하여 적정예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

① 설계자는 발주기관의 전체 공사비를 초과하거나 부실설계 또는 공사 중 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생되지 않도록 설계 초기단계부터 예측 가능한 설계를 하기 위해서 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

② 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

마. 설계자는 본 과업을 수행함에 있어 건물 기능의 충족, 확장성, 안전 및 편의보장, 에너지절약, 유지관리의 경제성 등을 확보하여야 한다.

바. 설계자는 발주기관의 의견 및 지시사항을 최대한 수용하여 설계에 반영하여야 한다.

사. 설계자는 본 과업내용서에 대한 대안을 제시할 수 있으며, 이에 대한 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관이 승인할 경우 제시한 대안을 적용할 수 있다.

아. 설계자는 “건축물의 설계도서 작성기준”(국토교통부고시)에 따라 계획설계, 중간설계(기본설계), 실시설계 도서를 작성한다.

2. 과업수행 단계별 제출서류

가. 착수신고서 및 과업수행계획서(용역계약 후 7일 이내 제출)

1) 착수계(공문포함)

2) 책임기술인 선임계(기술자격증 및 경력증명서 사본 첨부)[붙임 2]

3) 설계용역수행 조직표(연락처 기재)

4) 각 공종(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등) 분야별 책임기술인 및 참여기술인 투입계획 및 명단

- 각 공종간의 업무 범위와 책임한계

- 분야별 책임기술인 이력서, 기술자격증 및 경력증명서 사본 등

5) 설계용역 예정공정표(계획, 중간, 실시설계의 납품예정일자 명시)

- [붙임 8] 표준설계관리일정표를 참고하여 당해 사업특성에 맞게 조정하여 제출

6) 낙찰금액에 대한 산출내역서(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

7) 공동도급표준협정서(공동계약의 경우)

8) 보안서약서[붙임 3]

9) 하도급 예정 현황(하도급 승인요청은 용역착수 후 30일 이내 제출)

10) 관련서류(사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항 및 납세증명서 등)

11) 기타 발주기관이 제출하도록 한 사항

나. 계획설계 도서 납품(Ⅵ. 설계도서 납품목록 참조)

1) 계획설계 보고서

① 주변 도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(스케치 및 스터디 모형 포함)

② 대지 내 동선계획 및 주차계획(주차대수 산출근거 포함)

③ 개략 평면·입면계획 및 주변과의 조화

④ 조경계획

⑤ 우·오수 처리계획

2) 관련법규 검토서(건축법, 건설기술 진흥법, 기타 관련 법령·기준 및 각종 영향평가 포함)

3) 현장조사 보고서(지장물 현황 포함)

4) 측량성과도

5) 유사시설 견학보고서

6) 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술인 확인)

7) 기타 발주기관이 요구하거나 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

다. 중간설계도서 납품(Ⅵ. 설계도서 납품목록 참조)

1) 중간설계 보고서

2) 중간설계도서

① 도면

② 공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술인 확인한 내역서

③ 공사시방서(초안)

④ 구조계산서, 부하계산서 등 계산서

3) 설계 적정성 검토 조치 보고서

4) 주요공법, 장비, 자재선정보고서(대안제시, 선정사유 및 예산비교 등)

5) 녹색건축 인증 일반등급 취득 관련 검토서 및 자료

6) 건축물 에너지효율 1++등급 이상 취득 관련 검토서 및 자료

7) 제로에너지 건축물 인증 5등급 취득 관련 검토서 및 자료

8) 장애물 없는 생활환경 인증 취득 관련 검토서 및 자료

9) 지질조사보고서(필요시 계획설계 단계에서 제출)

10) 예산초과 시 예산절감방안 검토서

11) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)을 고려한 공사기간 검토자료

12) 유해ㆍ위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장[산업안전보건법 시행규칙 제86조(기본안전보건대장 등) 관련]

13) 기타 발주기관이 요구하거나 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 실시설계도서 납품(Ⅵ. 설계도서 납품목록 참조)

1) 종결보고서

2) 설계 설명서

3) 실시설계도서 일체

4) 설계 적정성 검토 조치 보고서

5) 설계VE 검토 조치 보고서

6) 조감도

7) 예정공정표(전 공종, 공사기간 산출근거 포함)

8) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료 포함)

9) 녹색건축 예비인증서

10) 건축물 에너지효율 예비인증서

11) 제로에너지 건축물 예비인증서

12) 장애물 없는 생활환경 예비인증서

13) 에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류

14) 신·재생에너지 설비 설치계획서 검토 관련 증빙서류

15) 설계안전성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항(건설기술진흥법 시행령 제75조의2 설계의 안전성 검토 관련)

16) 중간설계 이후 보완된 설계안전보건대장[산업안전보건법 시행규칙 제86조(기본안전보건대장 등) 관련]

17) 공사계약요청자료

① 공사원가계산서

② 관급자재목록

③ 내역서(excel file)

④ 공사개요, 현장설명서 및 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등

18) 자재견본자료(제품명, 색상, 규격 등 포함)

19) 손해배상보험증권(가입기간 : 3년)

20) 기타 발주기관이 요구하거나 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

마. 용역의 공정보고서(주간공정보고, 월간공정보고)

3. 업무보고 및 회의

- 설계자는 계획안 등 전 설계과정에서 정기적으로 진행사항을 보고하여야 하며, 주요공법, 자재선정 등 모든 설계과정에서 발주기관과 충분한 협의를 통하여 발주기관이 의도하는 사항이 충분히 반영되도록 한다.

가. 업무보고

1) 주간공정보고 : 매주 금요일 오전 10시(협의 후 변경 가능)까지 [붙임 4]에 따라 발주기관 담당자에게 전자우편으로 제출

2) 월간공정보고 : 매월 마지막 금요일 오전 10시(협의 후 변경 가능)까지 [붙임 5]에 따라 공문으로 제출

3) 수시보고

① 발주기관의 요청이 있는 경우 해당사항에 대해 보고

② 문제점 발생 시 문제점을 분석하여 보고

나. 업무회의

1) 일반사항

① 설계용역과 관련된 회의는 설계자 또는 발주기관이 필요하다고 판단할 때 소집한다. 이 경우 회의의 목적이 분명해야 하며, 설계자는 각 회의 종료 후 회의록을 작성하고 참석자 모두가 사인 후 발주기관에게 제출하여야 한다.

② 회의록 작성 시 일련번호, 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문, 책임소재와 일정 등을 포함한다.

③ 설계자는 각종 회의 시 책임기술인으로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료를 작성하여 회의에 참석토록 하여야 한다.

④ 발주기관은 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계 도서를 제출·요구하여 수정·보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

⑤ 설계자는 회의 시 책임기술인으로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

2) 착수회의

① 착수회의는 용역 착수일로부터 2주 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

② 착수회의 시 책임기술인은 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 수시 회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 설계단계별 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성·배부하여야 하며 보고회의는 상호간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

4) 계획설계/중간설계/실시설계 보고회

- 설계자는 계획설계(안)/중간설계(안)/실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 계획설계/중간설계/실시설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

1) ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙’ 제83조

2) ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령’ 제11조

나. 설계자는 상기 규정에 따라 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

5. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시)

2) 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시)

3) 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준(국토교통부고시)

4) 녹색건축 인증 기준(국토교통부고시)

5) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. ‘건축물의 에너지절약설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 한국에너지공단과 에너지절약 사전협의 실시

6. 설계의 적정성 및 경제성 등 검토(VE)

가. 설계자는 발주기관이 실시하는 설계의 적정성 검토 및 설계의 경제성 등 검토(VE) 관련 업무에 협조하여야 한다.

나. 기본설계 및 실시설계 단계에서 실시하는 설계의 적정성 검토 결과를 설계에 반영하고, 그 내용을 설계 적정성 검토 조치 보고서로 제출하여야 한다.

다. 설계의 경제성 등 검토(VE)에 따른 제안사항을 검토 후 설계에 반영하고, 그 결과를 설계VE 검토 조치 보고서로 제출하여야 한다.

7. 보안성 검토 및 비밀유지

가. 설계자는 본 과업내용서에 따라 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 설계자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계 제출시 설계에 참여하는 관련자 전원의 보안서약서를 첨부)

2) 설계자는 발주기관과 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료를 발주기관의 승인 없이 공개해서는 안 된다.

3) 설계자는 발주기관과의 검토 및 승인 창구를 단일화하고, 일정한 양식으로 체계화하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

4) 설계자는 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계자에게 있다.

8. 설계진행 시 유의사항

가. 현장조사

1) 문헌 및 서류조사

① 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

② 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획 확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

2) 현장조사

① 대지의 지상 지장물과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음·진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영·보관하여야 한다.

* 설계공모 공고시 발주자가 제공하는 지하매설물 공간정보시스템(GIS) 자료는 설계공모를 위한 참고용이며, 당선 후 설계자는 별도로 지하매설물 현황을 정확히 파악하여야 한다.

② 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

③ 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

④ 가스, 상·하수도, 오·폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉·난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사하여야 한다.

⑤ 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

3) 조사 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성·제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

나. 측량조사

1) 일반사항

① 측량조사는 측량법과 공공측량 작업규정에 관한 기준에 의거 시행한다.

② 측량조사 시 필요한 관계기관 협의 및 인허가(토지사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 계약상대자 부담으로 처리한다.

③ 측량조사를 통해 정확한 사업부지 면적과 상세현황을 도면으로 작성하여야 한다.

④ 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 설계자는 이를 설계자 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

⑤ 본 과업내용서에 명기되지 않았으나 설계자가 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

2) 조사측량

① 경계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 측량한다.

② 현황측량은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

③ 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 감독관과 협의 후 결정한다.

④ 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다. 공사 착공전 기준점 소멸시에는 재측량한다.

⑤ 조표는 임시용으로서 목항, 석항, 도로경계석, 노출암반 등을 측점표지로 사용하며, 위치는 기계설치에 지장이 없는 양호한 지반에 설치한다.

⑥ 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

3) 측량성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T·B·M, 지상 및 지하 지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

다. 지질조사

1) 일반사항

① 지질조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, 공수)를 작성·제출하여 발주기관의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

② 지질조사는 발주기간이 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한, 기초구조 설계에 필요한 시험은 발주기관과 협의하여 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

③ 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

④ 계약상대자는 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 한다.

⑤ 지질조사시 책임기술인이 상주하여 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

2) 조사방법

① 지질조사는 계획 설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 실시함을 원칙으로 한다.

② 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중·장기적 안정성이 요구되는 주요 구조물이 위치하는 지역은 발주기관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

③ 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 지지층까지 실시하여야 한다.

④ 계약상대자는 현장지질조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시하여야 한다.

3) 지하수위측정

① 시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 측정한다.

② 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.

4) 시료상자는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하여 정리·보관하여야 한다.

5) 토질 및 암석시험

① 표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KS F 규정에 의거 실시한다.

② 내진설계를 위해 탄성파탐사 시험을 실시한다.

③ 토질 및 암석시험으로 토지의 정확한 성질을 분석하여 기초설계에 반영한다.

6) 지질조사 완료 후 모든 시추공은 지하수 오염방지를 위해 반드시 관련 규정에 따라 폐공처리 하고 감독관의 확인을 받는다.

7) 성과품

① 지질조사보고서 5부

② 시료보관상자(75cm×40cm×6cm 이상) 및 시료

③ 보고서 작성(A4 규격 / 시추사진 및 전경 등 칼라사진 첨부)

9. 하도급 관리

1) 설계자는 본 설계 용역을 다른 업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 각종 조사 이와 유사한 작업

② 지질조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

③ 기계설비, 전기·정보통신, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

④ 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

⑤ 건설공사의 수량 및 견적업무

⑥ 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 설계자는 [붙임 6] 양식에 따라 발주기관으로부터 서면 승인을 받아 본 계약에 따른 용역업무의 일부를 하도급(기술제휴, 기술협력 포함) 할 수 있다. 이 경우 하도급 관련 법령을 준수하여야 한다.

4) 설계자는 발주기관으로부터 사전승인을 득하고자 하는 경우에는 [붙임 6] 양식에 준하여 사전승인을 요청해야 하며, 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에게 통지하고 관리를 받아야 한다.

① 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

② 하도급 받은 용역업자와 참여기술인 현황

③ 하도급 기간 및 하도급 금액 등

5) 설계자는 하도급자를 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

① 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

② 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

6) 발주기관은 승인된 하도급 용역의 수행에 있어서 당해 설계자가 용역업무 추진 능력이 없다고 인정되거나 또는 성실히 그 의무를 다하지 않을 경우에는 설계자에게 하도급자의 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 설계자는 특별한 사유가 없는 한 하도급자를 교체하여야 한다.

7) 하도급으로 시행한 설계 성과는 설계자의 책임으로 한다.

Ⅲ. 설계도서 작성기준
국토안전관리원 청사 건립공사 건축설계 용역
	1. 일반사항 2. 법령 등의 적용기준 3. 도면작성 기준 4. 시방서 작성기준 5. 내역서 작성기준 6. 설계에 사용되는 재료 7. 설계도서 표기 8. 설계도서의 분리작성

Ⅲ		설계도서 작성기준

1. 일반사항

가. 설계도서의 작성방법은 발주기관이 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주기관과 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다.

나. 본 과업내용서는 일반적인 사항을 규정한 것으로, 제시한 과업의 목적, 건립규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 한다.

다. 발주기관이 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면 질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 성과품은 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술 진흥법, 엔지니어링산업 진흥법, 국가기술자격법, 에너지이용 합리화법, 녹색건축물 조성 지원법, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 실내공기질 관리법, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방시설공사업법, 지하안전관리에 관한 특별법 및 위의 각 법의 시행령, 시행규칙과 고시, 예규, 규정, 훈령, 김천시의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 한다.

나. 본 과업은 “설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침”(국토교통부고시)에 따라 수행하여야 한다.

다. 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등) 건설기술진흥법 시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토 등), “공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준”(국토교통부고시) 및 “건축물의 설계도서 작성기준”(국토교통부고시) 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

라. 본 과업은「건축구조기준」에 따라 내진설계를 수행한다.

마. 설계자는 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여 협의 후 설계를 진행한다.

바. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계자는 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반할 경우 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 따라 조치될 수 있다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 한다.

3) 일체의 책임 및 손해에 대하여 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 설계자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령[건축사법 제11조(자격의 취소 등), 제20조(업무상의 성실의무 등)]에 따라 조치될 수 있다.

4) 설계자는 용역착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

① 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

② 기획재정부 계약예규 용역계약일반조건 제41조

③ 엔지니어링산업진흥법 제31조 및 같은 법 시행령 제42조

④ 건설기술 진흥법 제34조 및 같은 법 시행령 제50조

⑤ 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시)

⑥ 건축사법 제20조 및 같은 법 시행령 제21조

3. 도면 작성기준

가. 도면규격은 Ⅵ. 설계도서 납품목록에 따른다.

나. 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주기관의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술인이 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술인의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

4. 시방서 작성기준

가. 시방서는 조달청 제공 양식[나라장터 홈페이지(www.g2b.go.kr) → 나라장터서비스 → 부가서비스 → GUIDE-시방서]에 따라 표준시방서와 특기시방서로 구분하여 작성한다.

1) 표준시방서 : 일반적으로 적용하고 공통적으로 수용할 수 있는 시방서

2) 특기시방서 : 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가·수정·삭제를 할 필요가 있을 때 적용하는 시방서

나. 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서, 토목공사 표준시방서, 건축전기설비공사 표준시방서, 건축기계설비공사 표준시방서, 소방설비 공사 표준시방서를 기준으로 작성한다.

다. 특기시방서는 자재 관련 시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

라. 본 공사와 관련이 없는 공종의 시방이 포함되지 않아야 한다.

5. 내역서 작성기준

가. 설계내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈 및 표준시장단가를 참조하여 발주기관과 협의하여 적용하여야 하며, 내역서 파일은 조달청 공사원가호환규정 및 코드에 따라 작성되고 호환규정검증시스템에 오류가 없도록 작성하여야 하며, Microsoft Excel(2016버전)과 호환되도록 작성한다.

나. 공사비 내역서는 국토교통부 “건설공사 표준시장단가 적용공종 및 단가”, 기획재정부 계약예규 “국가입찰·계약 집행기준”, “예정가격 작성기준” 및 고용노동부 “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준” 등 관련 법령과 기준에 따라 산출한다.

다. 재료비는 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달청 가격정보)을 우선 적용하며, 조달청 조달정보에 미수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용하고 이에 따른 단가조사서를 작성·제출하여야 한다.

라. 직접노무비는 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중 노임을 적용한다.

마. 공사비는 예정공사비를 기준으로 작성하여야 한다.

바. 공사비에는 지장물이설비, 각종 분담금 및 폐기물처리비(100톤 이상일 경우 분리발주를 위한 별도 내역 작성) 등이 포함되어야 한다.

사. 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 반드시 기록하고, 일위대가가 없는 공정의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록한다.

아. 주요자재(관급발주) 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

자. 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용할 경우에는 반드시 그 근거를 제시하여야 한다.

6. 설계에 사용하는 재료

가. 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(KS), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경성 및 LCC 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 위의 가목을 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 발주기관의 승인을 받아야 하며, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다. 단, 외국산 자재 사용이 필요한 경우 선정사유 및 근거자료, 주요자재의 수량, 단가, 금액 등을 발주기관과 협의 후 채택한다.

다. 설계자는 원칙적으로 특정제품(공법 및 기술)을 사용할 수 없으며, 불가피한 경우에는 [붙임 9] 특정자재 사용리스트에 따라 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 제출하고, 그 내용을 종합적으로 검토한 후 자문회의 또는 기술심의 등을 통해 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 설계에 반영한다.

라. 정부기관(국토교통부, 산업통상자원부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증 제품 중 본 과업 특성에 맞는 것은 적극 검토 및 적용하여야 하며, 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 자문회의 또는 기술심의 등을 통해 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 설계에 반영한다.

마. 건축물에 사용하는 자재는 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 및 「녹색제품 구매지침」(환경부)에 따라 친환경인증자재(환경마크 인증제품) 사용을 우선 고려하고, 적용 시에는 설계서에 친환경 인증자재임을 표기한다.

바. 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

사. 설계자는 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

아. 설계자는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제12조에 따른 공사용 자재 직접구매 대상품목에 대한 적용여부를 검토하여야 한다.

자. 공사비 내역서에 관급자재와 사급자재는 명확히 구분하여 표기한다.

차. 외장재, 창호개폐방법, 천장마감시스템 및 방수재(공법) 등 주요자재는 비교검토서 및 견본을 준비하여 발주기관과 협의 후 결정한다.

7. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

8. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하고, 발주기관과 협의하여 결정한 발주단위별로 내역을 작성하여야 한다(도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등).

나. 건축폐기물처리, 실습구조물(건축) 및 실습구조물(토목) 설계도서는 분리발주가 가능하도록 별도 작성하여야 한다.

Ⅳ. 분야별 설계지침
국토안전관리원 청사 건립공사 건축설계 용역
	1. 설계의 전제조건 및 방향 2. 건축분야 3. 구조분야 4. 토목분야 5. 기계분야 6. 전기분야 7. 정보통신분야 8. 소방설비분야 9. 조경분야 10. 안전관리분야

Ⅳ		분야별 설계지침

1. 설계의 전제조건 및 방향

가. 설계자는 반드시 개요에 명시된 예정 총공사비 이하로 설계하여야 하며, 관계법령 및 제반사항에 대하여 면밀히 검토하여 위반사항이 없이 설계하여야 한다.

나. 향후 기숙사동(120인 수용) 증축을 고려하여 마스터플랜(유보지 설정 또는 주차장 부지에 필로티 형식으로 건축 등)을 계획한다.

다. 건축 및 설비의 시스템, 자재, 기기의 선정은 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화할 수 있고, 장래 증설이나 변경 및 개·보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

라. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 각 분야 간의 긴밀한 협조하에 건축물 각 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 계획한다.

마. 각종 설비는 자동화된 운전관리를 통하여 업무효율의 극대화 및 인력 절감을 꾀할 수 있도록 계획한다.

바. 설계자는 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

사. 분야별 설계지침은 설계를 진행하기 위한 기본적인 요구를 제시한 것으로, 설계자는 분야별 설계지침을 바탕으로 관련법규 및 건축설계에 관한 일반적인 사항을 적용하여 발주기관의 필요에 가장 적합한 계획안을 제시하여야 한다. 또한, 본 분야별 설계지침은 설계 용역 계약 후 설계 진행과정에 따라 발주기관과 설계자가 협의하여 변경될 수 있다.

2. 건축분야

가. 배치 및 동선계획

1) 합리적인 배치 및 외부공간 계획

① 주변 도로망, 건물 및 북측 공원과의 조화와 유기적 연계를 고려

② 보·차도에서의 상징성과 인지성 확보를 고려한 계획

③ 다양한 용도 활용을 고려한 가변적 공간 및 구조계획

④ 근무인원, 외부 방문객, 장래 발전 등 주변여건을 감안하여 계획하되, 안전과 편리성을 고려한 적정규모의 공간과 효율적이고 기능적인 배치

⑤ 실내·외 편의시설은 가능한 한 상호 유기적으로 사용할 수 있도록 계획하고 실외 편의공간은 조경계획과 연계

⑥ 교육시설과 체험시설은 단일 건물 또는 분할 건물 중 선택 가능

2) 진입부에 Open Space를 조성하여 방문객을 맞이하고, 주변환경과 조화

① 소통과 교류가 원활한 계획으로 외부동선을 내부로 유입

② 지역주민이 자유롭게 접근하여 휴식할 수 있는 기능 고려

③ 지구단위계획에 따라 대지 내부(율곡동 1100번지와 1101번지 사이)에 공공보행로가 있어 영역이 구분되므로 시설별 특성 및 시설 간 연계성을 고려하여 배치하고 차량 및 보행 동선이 유기적으로 연결될 수 있도록 계획하되, 공공보행로 주변은 안전하고 쾌적한 보행환경으로 조성하고 외부공간과 연계를 고려

3) 발주기관의 업무특성을 고려한 진출입 계획

① 기능에 적합한 합리적인 업무·방문·서비스 차량동선 계획

② 부지 진출입구는 주변 교통상황을 고려하고 지구단위계획을 준수하여 계획(별도 제공하는 지구단위계획 시행지침 및 결정도 참고)

③ 보행동선과 차량동선을 명확히 구분하여 보행자의 안전을 확보하고, 재난 발생 시 긴급한 대피가 가능하도록 효율적인 동선을 고려한 출입구를 계획

④ 물품·장비 반출입, 쓰레기 처리, 서비스 및 유지관리를 위한 별도 동선을 확보하도록 계획

⑤ 실습차량 차고지는 실습구조물(건축·토목)까지의 차량 동선을 고려하여 계획

나. 평면계획

1) 기능별로 구획된 합리적인 조닝

① 명확한 기능의 분리 및 통합을 통한 효율적 업무환경 조성

② 각 실별 용도와 기능에 적합한 공간을 계획하여야 하며, 사용자의 편의성을 최대한 반영하여 쾌적함 확보

③ 교육시설, 체험시설, 사무/관리시설, 편의시설 등 각 영역별 특성을 감안하여 독립성을 부여하되, 각 영역별 시설간의 연계성을 고려하여 동선체계가 원활하도록 배치

2) 다목적 기능을 고려한 특색이 있는 로비공간 계획

① 전시, 홍보, 휴게 등 다양한 이벤트가 가능한 확장성 있고 개방적인 공간으로 조성하여 소통과 교류의 공간으로 활성화가 가능하도록 설계

② 적정한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있는 공간으로 계획

3) 용도별 시설의 합리적인 공간조성

① 용도에 따라 내·외부인의 접근성을 고려하고, 다양한 활용 및 유지보수의 편의성 증대

② 용도에 따라 적절한 통합과 통제로 보안성을 확보(필요시 2중 보안)하고, 직원 및 외부인의 접근성을 고려

③ 사용자(교육생 및 직원 등)별 주요 사용공간이 자연스럽게 연계 가능하도록 계획하여 사용의 편의성 증대

4) 층별 평면계획

① 시설별 기능 및 특성을 고려하여 배치하고 층수 및 층별면적은 설계자가 합리적인 설계안을 제시

② 실의 형태 및 위치는 실의 사용 용도에 적합하게 계획하고 포스트 코로나 대응 및 감염병 예방관리를 고려하여 기계식 환기설비 및 환기창을 계획하고 공용부로부터 오염된 공기가 내부 공간으로 유입되지 않도록 계획하며 제로에너지 등의 인증에 관련된 신·재생에너지 적용 등의 계획이 현실적으로 반영될 수 있도록 계획

③ 전문위원실, 강사대기실 및 방송통신실 등은 사무/관리시설과 인접하여 계획

④ 창가테이블(냉난방 이용자 피해 최소화), 벽면 디자인 공간 등 공간이 효율적으로 운용될 수 있도록 계획

⑤ 체험시설 중 안전체험공간 및 전시공간은 일반인의 접근성 및 휴식공간과의 연계 등을 고려하여 계획

⑥ 이용자의 특성을 고려하고 상충기능은 분리하고 상호보완기능은 인접 배치하는 등 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치

⑦ 장애인, 임산부 등의 편의시설은 관계법령에 따라 이용자의 안전을 고려한 시설물을 설치하도록 계획

⑧ 강당, 강의실 및 식당 등 다수의 인원이 모이는 실의 피크타임과 화재 등의 비상시를 고려하여 대피동선을 계획하고 소방진입용 동선을 확보하며 로비, 복도, 홀 등의 면적을 여유있게 확보하고 출입구 주변은 적정규모로 계획

⑨ 기계실, 전기실은 장비 반·출입이 용이한 위치에 계획하여야 하며, 전기실은 침수피해가 발생하지 않도록 계획

⑩ 식당, 매점 및 카페테리아는 이용자(교육생 및 일반인)가 이용하기 편리하게 계획하고 외부공간과 연계되는 쾌적한 공간으로 설계

⑪ 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려하여 미래지향적이고, 다양화된 창의적인 평면 형태를 디자인

⑫ 공간활용 효율성을 극대화하기 위해 기준층 복도 등의 공용공간 면적을 최소화

⑬ 실별 특성 및 조닝에 따른 보안단계를 설정하여, 존(Zone)별 및 실별 출입문에 적정한 단계의 보안시스템이 적용될 수 있도록 계획

⑭ 추후 근무 인원의 증가를 고려한 건축 모듈계획

다. 입면 및 단면계획

1) 국토의 안전을 선도하는 기관으로서 상징성 부여하고 설계의 기본개념을 부각시킬 수 있도록 계획

2) 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등을 느낄 수 있도록 계획

3) 지상 5층 이하로 계획하여야 하며, 지하층은 설치 불가(단, 설비층은 지하 설치 가능)

4) 입지조건, 주변경관, 주변과의 조화를 고려하여 입면계획을 구상하고, 외장 마감은 시설에 부응하도록 계획

5) 냉·난방부하 저감을 위해 남측면 일사량을 최소화하도록 단면계획하며, 차양 등의 일사 차폐시설 설치를 고려

6) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획하되, 강당 및 체험시설 등 일정 이상의 높이가 필요한 공간은 층고 특수성을 고려

7) 층별 각 실의 특성 및 기능에 맞는 충분한 천장 높이와 복도 및 각 실로의 출입문의 폭을 확보

8) 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획

9) 건물 내의 특정실(식당, 주방 등)의 냄새 등이 건물 내에 확산되지 않도록 자체 환경시설과는 별도로 단면계획에 반영

라. 지붕 및 우,배수 계획

1) 누수 관련 하자가 발생하지 않는 재료로 설계

2) 우수가 고여 관련 하자가 발생하지 않을 수 있는 지붕형태로 설계

3) 지붕의 면적이 넓어 우수 흐름 구배를 방수층 보호콘크리트 등으로 유지하기가 곤란한 경우 지붕층 슬래브 자체에서 구배를 확보

4) 태양광·열 등 신·재생에너지의 설비가 지붕에 위치할 경우 경관 및 미관을 고려

마. 재료 및 색상계획

1) 사용자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고, 내구성, 내화성, 내후·내식성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감방법을 선택

2) 사용자재는 건축법 관련규정에 적합하게 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 방염처리를 소방관련 법령에 맞도록 설계

3) 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해물질이 적은 친환경 재료를 선정

4) 로비, 홀 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜 되며 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 선정

5) 색채는 혼합색 사용을 원칙으로 하되 계획 시 비교 가능한 색채계획을 수립하여 설계 시 발주기관과 협의하여 결정

바. 주차계획

1) 주차장법, 건축법 등을 고려하여 합리적으로 계획하여야 하고, 유도설비 등의 충분한 설치를 통해 보행자 및 시설이용자의 안전을 확보

2) 법적 주차대수(장애인주차 포함) 외 직원 및 교육생 등의 주차수요를 고려하여 150대 이상으로 계획(조경면적 등에 대한 법적 기준을 준수하는 범위에서 최대한 많은 주차대수를 확보)

3) 전체 지상주차로 계획하고, 직원과 교육생의 주차구역은 가급적 분리하며, 물품 등의 자유로운 반·출입, 셔틀버스 정차 및 비상차량 주차 등을 고려

4) 장애인·임산부 주차면은 출입구 인근에 배치하여 사용에 지장이 없도록 계획하고, 자전거와 이륜차 이용자를 위한 보관소를 계획

5) 주차장 일부 공간은 행사 또는 운동시설로 활용 가능하도록 프로그램 주차 고려

6) 대형차량(버스) 주차공간 1대 이상 확보

7) 실습차량 차고지는 진출입이 편리한 곳에 배치하고, 실습차량의 회전반경(45인승 버스 기준)을 고려하여 차고지부터 진출입구 및 실습구조물(건축·토목)까지 동선을 계획

사. 실내건축계획

1) 기관의 이미지를 적극적으로 표현하고 직원들로 하여금 자부심을 느낄 수 있는 공간 계획

2) 활동적인 실의 공간계획은 개방형 평면으로 구성하되, 유지관리가 원활한 공간으로 계획

3) 다수의 이용자가 사용하는 공간의 경우 향후 트렌드를 고려한 실내건축 계획을 하고 편의성을 확보

① 로비 및 홀의 경우 전시, 홍보, 휴게 등의 다양한 컨텐츠를 수용하는 효율적인 공간 계획

② 비즈니스룸의 경우 홍보공간과 회의공간이 연계된 자유로운 공간으로 방문객의 쉼과 접견을 위한 공간이자 발주기관의 이미지를 부각시킬 수 있는 쾌적하고 고급스러운 마감계획과 품격 있는 공간 계획

③ 강당의 경우 다양한 기능을 수용할 수 있는 대규모 공간으로 흡음과 방음을 고려한 예술적 감각이 느껴지는 공간연출

④ 업무공간의 경우 조직개편에 유연하게 대응할 수 있는 쾌적한 실내건축, 편안한 조명계획과 1인당 적절한 전용면적 제시로 넓은 업무공간 확보

4) 문 손끼임 방지, 바닥 미끄럼 방지, 시설이용자 등 추락 방지, 모서리 및 각진 부분의 안전장치 적용 등을 통해 이용자의 생활안전사고 예방을 위한 계획을 반영

5) 천장, 벽체, 바닥 등 실내공간 계획 시 비교 가능한 색채계획을 수립하여 설계 시 발주기관과 협의하여 결정

3. 구조분야

가. 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조 해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있어야 함

나. 구조의 안전성능은 법령 및 정부, 학회, 국토교통부 산하 연구소 등에서 정한 설계기준을 준수

다. 고정하중, 활하중, 풍하중, 적설하중, 지진하중, 토압 및 수압, 온도하중, 유체압 등은 해당실의 용도 및 기능 등 각종 변수를 감안하여야 하며, 건축법 및 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준 등 건축구조관련규정에 적합하게 계획

라. 발주기관 업무용도에 적합한 경간을 계획을 하고, 사용상이나 미관상 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 계획

마. 각종 하중에 저항하기 위한 다양한 구조시스템을 검토 후 건물의 안정성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화된 시스템 적용

바. 재난과 지진(내진설계 특등급 적용), 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려

사. 지질조사 결과를 반영하여 적절한 기초구조를 선정

아. 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시

자. 주요 구조부위 치수를 모듈화 하고 건물 마감을 고려

차. 강당 및 식당 등을 무주공간으로 계획할 경우에 구조형식 및 시공방법에 대해 종합적으로 검토

4. 토목분야

가. 설계자는 발주기관이 제공하는 자료 이외에 본 공사와 관련된 현지 지형, 지역적인 여건, 배수상황, 구조물현황 및 지질현황 등 제반여건을 상세하고 명확하게 조사하여 계획

1) 사업부지내 현황측량 및 지장물 조사 등을 실시하여 필요한 지형현황 및 지장물도를 작성하고, 안전에 필요한 조치를 강구하며, 관계기관과 협의 후 처리방안을 설계도면, 지침서 등에 제시

2) 지질조사를 통하여 지반의 성층상태 및 기초공학적인 지반특성 등을 파악하여 신축건물 기초지반 허용지내력을 추정하고 기초형식을 계획

3) 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영

4) 「건설현장 축중기 설치 지침(국토교통부훈령)」에 따라 축중기를 설치하여야 할 경우 설계에 반영

나. 공사에 따른 민원 검토 및 주변 구조물의 피해 예상, 경제성, 굴착심도 등을 고려하여 적절한 공법을 선정

1) 붕괴, 파괴, 과다한 변형을 방지할 수 있는 공법을 선정하여, 안전하고 경제적이며, 합리적이고 공기가 최소화 되도록 설계

2) 안전확보를 위해 필요한 계측사항에 대해서는 계측기의 종류 및 설치 수량 등을 설계도서에 반영

다. 부지내 제반요소 및 효율성 등을 고려하여 신축건물의 부지계획고를 결정함으로써 절토 및 성토량을 최소화

라. 도로 및 보도의 포장은 친환경성, 안전성, 시공성, 경제성, 유지관리, 사용자의 편의성 등을 고려하여 적정 포장재를 선정하도록 하며, 포장단면은 동결지수, 교통량, 토질조건 등을 고려

마. 우·오수시설은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화하는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 함

5. 기계분야

가. 공공기관에 대한 관련법령 등 제규정에 적합하도록 설계

나. 건축·토목·전기 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하여 계획하고, 유지관리에 문제가 없도록 고려

다. 쾌적한 실내환경 조성을 위한 적정 환기량 확보 및 공조조닝 구분, 실내공기질 개선, 소음·진동 최소화 계획

라. 자연환기, 외기 냉·난방 등 자연 조건을 활용한 에너지 절약 계획과 주요 장비에 대한 경제성, 유지관리 편의성을 고려하여 최적의 시스템을 계획

마. 유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고, 보수점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하며, 장비의 반·출입 등에도 대비할 수 있게 계획

바. 상·하수도 및 도시가스, 지역난방 등 김천시 및 관계기관 인프라 관련사항을 확인하여 설계에 반영

사. 정부의 에너지 정책에 부응하는 LCC분석에 따른 열원방식을 선정하고, 신뢰성 확보 및 고효율의 경제적 열원방식 구축

아. 용도 및 부하특성을 파악하여 특성에 적합한 공기조화 및 환기설비 계획

자. 적정 수압유지 및 에너지 절약적인 위생설비 구축과 규모를 고려한 급수 및 급탕 설비 계획 수립

차. 중앙감시시스템 설치로 실내의 온·습도 환경 및 장비 운영상황을 통합감시 및 관리 가능하도록 하며, 방재센터의 통합관리 시스템과 연동을 계획

6. 전기분야

가. 전기설비는 최적의 시스템으로 안전성·경제성·확장성 등에 중점을 두어 계획하고, 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 고려

나. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 의한 신·재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템과 신·재생에너지 공급 의무 비율을 계획에 반영

다. 전력의 안정적인 공급을 위한 인입방식을 계획

라. 통신선의 유도장애를 고려하여 전력인입과 통신인입을 이격하여 설치

마. 모든 수·변전 설비는 안전을 고려하여 폐쇄형 큐비클에 수납

바. 예비전원설비는 유사시 기능이 중단되는 것을 피하고 화재시에 소화활동 및 피난유도등에 지장이 없도록 전력공급을 계획하며, 중앙감시실에서 원격조작이 가능하도록 설계

사. 전력간설설비는 배선거리의 최소화 등을 고려하여 전력손실을 줄이고, 공사비의 절감 및 시공의 용이성 등을 감안하여 설계

아. 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화가 되게 하고, 고효율 LED 조명의 사용을 고려

자. 건축물, 옥외공간 및 주변환경을 연계한 경관조명시설을 계획하며, 필요한 조도를 확보하고, 조명기구의 디자인 및 설치장소에 대하여도 종합적으로 고려. 특히, 실습구조물(건축·토목)에 실습교육을 위한 적절한 조명시설을 설치

차. 주차장은 자동화 운영하고, 주차장내 CCTV 설비와 연계하여 설계

카. 사무실의 전기, 전화, OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획

타. 승강기 설치는 관계법령 및 검사 기준에 적합하도록 설계하여야 하며, 소요대수, 탑승인원 및 정격속도는 건물규모, 사용인원 및 동선 등을 고려하여 적정하게 계획하고, 수송효율을 높일 수 있는 방식으로 계획

1) 승강기는 (비상)조명, 환기설비, 냉난방설비, 위치표시기, 인터폰, 비상탈출구, 비상호출장비 등이 반영되어야 하고, 비상시에도 운행에 지장이 없도록 하는 등 안전기술기준에 적합한 시설로 계획

2) 모든 승강기에는 영상정보처리기기의 카메라를 설치

파. 무정전전원설비(UPS)가 필요한 실, 시설 및 장비를 검토하여 반영

7. 정보통신분야

가. 정보통신설비는 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있는 정보통신 시스템을 도입하여 기술적 확장성과 유효성, 편리성, 경제성, 안전성 있는 통신 서비스를 제공 받을 수 있도록 계획

나. 주요자재에 대한 공인기관의 검사 및 시험항목을 표기하여야 하며, 정보통신기기 등은 방송통신위원회 형식 승인품 및 KS인증품이어야 하고, 장비사양은 정부통합전산센터 정보자원기술기준 검증지침을 준용

다. 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경없이 자유로운 설치를 고려

라. 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로설비, 이동통신 구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 시공과 사용에 지장이 없도록 계획

마. 다수 교육생을 대상으로 한 온라인교육 및 본 건물과 원격지와의 회의가 가능하도록 시스템을 구축하여 원활한 교육 및 회의 지원과 편리성을 제공

바. 본 건물 내·외의 전체 및 층별 각종 안내방송, 일반 공지사항 전달은 물론 라디오, BGM 등을 방송하는 구내방송과 소방법규에 의거 화재시나 비상시 방재설비와 연동하여 비상 유도방송을 가능하게 계획

사. 본 건물의 주요 기능인 교육 및 각종 행사(회의·세미나 등)를 효과적으로 지원이 가능하도록 A/V 시스템을 구성하고 품질 확보를 위한 양질의 시스템을 반영

아. 방재실에서 시설관제, 보안관제, 전산관제 화면을 대형영상화면을 통해 전체 또는 각각 표출 제어할 수 있도록 설계

자. 통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계 및 시공과 사용성에 지장이 없도록 계획

차. 건축물 내·외부 및 주차장 등 보안이 요구되는 장소에 고정 및 회전형 카메라를 설치하여 24시간 감시 체계를 구축

8. 소방설비분야

가. 건축물 내에서 발생할 수 있는 모든 화재의 신속한 감지와 경보 및 초기화재진압을 위한 체계적 방재계획을 수립하여 건축물의 특성 및 용도에 적합한 최적의 소방시설을 적용하여야 하며, 향후 유지관리의 편리성을 고려한 설계적용으로 완벽한 방재시스템을 구축

나. 관련법규를 준수하고, 성능위주의 소방설계를 통해 인명 및 재산피해를 최소화할 수 있도록 계획

다. 화재의 신속한 발견, 조기 소화, 적극대응, 안전한 피난유도에 중점을 두어 계획

라. 한국공업표준협회규격, 국가화재안전기준 등 최신의 관련 법규 등을 적극 수용하여 설계

마. 품질 및 성능면에서 신뢰할 수 있는 신기술 및 신공법 적용을 검토 반영하되 시방서에 그 품질규격 및 시공방법 등을 반드시 명시

바. 방재시스템은 비상시 모든 운영체계를 일원화하고 효율적인 운영을 기할 수 있어야 하며, 재해발생시 소화 및 피난 등을 총괄 지휘하는 업무를 수행하는 데 지장이 없도록 설계

9. 조경분야

가. 조경면적, 수종 및 수량, 규격, 상록·낙엽비율, 식재밀도, 수급관계, 대상지 환경특성 등을 분석하여 그 특성을 반영한 공간을 조성하며, 주변의 환경조건에 적합하고 부지의 고유한 특성을 살릴 수 있는 경관이 유지되도록 계획

1) 경관적·생태적·이용 행태적 측면을 고려한 쾌적한 환경을 계획

2) 조경은 개방감 있고 심플한 광장형으로 조성(과다 식재 지양)하여 휴게공간 제공 및 녹지 활용도를 높일 수 있도록 계획

3) 불투수면 감소를 통해 빗물의 표면유출을 줄이고 빗물의 토양 침투를 증가시켜 물순환을 개선하고 오염저감을 달성하기 위해 저영향개발(LID) 기법을 적극 적용

나. 외부공간은 상징성 및 장소성을 갖게 하며 공간에 대한 신선함, 새로움을 느낄 수 있도록 설계

다. 공개공지, 휴게시설, 산책로 등의 구조물과 경관 조명시설 및 바닥 포장문양 등의 조경시설물은 공간의 통일된 분위기 연출을 위하여 의장계획과 연계하여 청사부지 전체의 통일성을 감안한 토탈디자인(Total Design)으로 설계

라. 주요 보행 등을 계획할 때 보행등, 투광등, 수목 등의 조명 시설 계획도 함께 고려하며, 각 공간이나 시설물의 독특한 야간경관 연출이나 보행인의 안전을 고려하여 야간조명 시설계획을 체계적으로 수립

마. 주요 설계대상인 보행공간, 휴게공간 등의 각종 시설 공간계획은 배리어프리(Barrier-Free) 개념을 고려하여 설계

바. 조경관련 시설물 등에 대하여는 위치, 규모, 재료, 수량, 내구성, 질감, 구조 등을 충분히 고려하여 디자인하고 이용자의 휴식 등을 위한 인공구조물을 설치하되, 주변지형, 부지 내 지형, 시설물 등과 조화를 이루도록 계획

사. 수목의 생육관리를 위한 자동관수 시설을 계획

10. 안전관리분야

가. 건설사업의 안전한 추진을 위해 시공 및 사용과정까지 고려하여 안전과 품질에 가장 적합한 방법의 계획을 구상

나. 설계완료 이전에 「건설기술진흥법」, 「지하안전관리에 관한 특별법」, 「산업안전보건법」, 「건축물 관리법」, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등 안전관련 법령에서 정하는 바에 따라 ‘설계안전성 검토’, ‘지하안전영향평가’, ‘설계안전보건대장’ 등 업무 수행 또는 기술적 검토를 하여야 하며, 이 과정에서 시설의 공사 및 사용과정에서의 안전관리 대책을 강구

Ⅴ. 설계도서 작성요령
국토안전관리원 청사 건립공사 건축설계 용역
	1. 공통사항 2. 계획설계 3. 중간설계 4. 실시설계

Ⅴ		설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. ‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)’을 준수하여야 하며, 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업의 과업내용서 및 설계지침서에 따른 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 설계도서 작성 시 제출서류 및 납품도서는 BIM 데이터를 활용하여 작성할 수 있다.

다. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 2개 이상의 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 설계자는 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 발주기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 설계자는 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획설계를 진행하고 작업 진행시에는 2개 이상의 대안을 제시하여 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 설계자가 제출한 대안이 부적합하다고 발주기관이 검토의견을 통보하는 경우에는 조속한 시일 안에 새로운 2개 이상의 대안을 재작성하여야 한다. 단, 이에 따른 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

4) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 설계서 구성

1) 계획설계 보고서

① 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(스케치 및 스터디 모형 포함)

② 대지 내 동선계획 및 주차계획(주차대수 산출근거 포함)

③ 개략 평면·입면계획 및 주변과의 조화

④ 조경계획

⑤ 우·오수 처리계획

2) 관련법규 검토서(건축법, 건설기술 진흥법, 기타 관련 법령·기준 및 각종 영향평가 포함)

3) 현장조사 보고서(지장물 현황 포함)

4) 측량성과도

5) 유사시설 견학보고서

6) 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술인 확인)

7) 기타 발주기관이 요구하거나 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

3. 중간설계

가. 정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정·보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공종별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

다. 설계서 구성

1) 건축

① 중간설계 보고서

·공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

·설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

·현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사, 분석, 검토 내용(반영사항 표기)

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

·개략공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

·주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

② 구조계획서

·설계근거기준

·구조재료의 성질 및 특성

·제반하중조건에 대한 분석

·각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

·구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

·지진에 대한 고려사항 등

③ 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

④ 도면종류

·부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

·배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 등 기타 필요한 사항

·주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치 등

·대지구적도

·건축면적 산출표

·내·외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천장, 외벽, 지붕 등

·각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200 기준, 필요시 변경 가능)

·입면도(정면, 측면 및 배면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

·단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

·계단 평·단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

·각층 창호 평·입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

·주요 구조부 단면상세도

·기타 실시설계에 기준이 되는 도면

2) 토목

① 중간설계 보고서

·공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

·계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

·시공방법

·개략공사비 산정

·기타 필요한 사항

② 구조 및 수리계산서

·구조계산서(옹벽, 가시설)

·수리계산서

·절(터파기)⋅성토 사면안정성검토서

③ 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

④ 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물

⑤ 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

⑥ 도면종류

·위치도

·종단면도 및 횡단면도

·평면도

·구조물도 및 부대시설도

·유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함)

·기타 실시설계에 기준이 되는 도면

3) 조경

① 중간설계 보고서

·공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

·개략공사비 산정

·기타 필요한 사항

② 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거

③ 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

④ 도면종류

·위치도

·조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타시공에 필요한 사항 일체

·녹지구적도 및 식재계획도

·조경시설물 : 조형물, 파고라, 벤치, 음수대, 휴지통, 안내판 류 등

·기타 실시설계의 기준이 되는 도면

4) 기계설비

① 중간설계 보고서

·사전조사사항

·설계자의 분석검토서

·각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교·검토 후 결정)

·개략공사비 산정

·기타 필요한 사항

② 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

③ 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

④ 도면종류

·범례 및 도면목록

·기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

·배치도 : 상·하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

·계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

·평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉·난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

·단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

·옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

·정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

·기타 실시설계의 기준이 되는 도면

※ 외부 조경의 유지관리를 위한 상수도설비 설치 등

5) 전기

① 중간설계 보고서

·전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

·수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항 포함

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

·에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

·인입방식 및 인입지점에 대한 설명

·개략공사비 산정

·기타 필요한 사항

② 계산서

·부하계산서(설계 시 산출근거 제출), 조도계산서 등

③ 시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

④ 도면종류

·범례 : 사용될 기호

·배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

·옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

·수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

·각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타 설비의 계통도

·각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

·기타 실시설계의 기준이 되는 도면

※ 외부 조경의 유지관리를 위한 전기콘센트 설치 등

6) 정보통신

① 중간설계 보고서

·통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

·통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항 포함

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

·에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

·국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

·개략공사비 산정

·기타 필요한 사항

② 계산서

·통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

·통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

·케이블 트레이 용량계산서 등

③ 시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

④ 도면종류

·범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

·배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

·옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

·통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

·각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

·각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

·기타 실시설계의 기준이 되는 도면

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정·보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주기관이 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.(검토용 도서 제출일자 발주기관과 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

① 설계 설명서

·공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

·설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

·세부시공계획(품질·안전·환경 관리계획 및 민원 대응 방안 포함)

·공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

·건물의 색채사용계획

·공정계획(공정표 포함)

·기타 필요한 사항

② 구조계획서

·설계근거기준

·구조재료의 성질 및 특성

·제반 하중조건에 대한 분석

·각부 구조계획

·구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

·지진에 대한 고려사항(내진설계) 등

※ 내진특등급 설계

·구조계산서

③ 시방서

·당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

·특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

④ 도면종류

·부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

·조감도(투시도) : 천연색채 사용

·도면 목록표

·배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물 부수시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

·부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

·주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

·구적도

·건축면적 산출표

·내·외부 마감표 : 바닥, 천장, 내벽, 외벽, 지붕 등

·각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

·각층 천장평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

·지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

·주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상표기

·주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

·계단 평·단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

·각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

·각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각층 기둥·보 위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

·부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

·기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평·입·단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

⑤ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

① 설계 설명서

·공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

·계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

·세부시공계획(품질·안전·환경 관리계획 및 민원 대응 방안 포함)

·자재사용계획

·세부공정계획

·세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

② 구조 및 수리계산서

③ 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

④ 시방서

⑤ 도면 종류

·도면 목록표

·위치도

·종단면도 및 횡단면도

·평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

·기타 시공에 필요한 사항 일체

⑥ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

① 설계 설명서

·공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

·세부시공계획(품질·안전·환경 관리계획 및 민원 대응 방안 포함)

·자재사용계획

·세부공정계획

·세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

② 시방서

③ 도면 종류

·도면 목록표

·배치도

·종단면도 및 횡단면도

·조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타시공에 필요한 사항 일체

·녹지구적도 및 식재계획도

·조경시설물 배치도(잔디, 조형물, 파고라, 벤치, 음수대, 휴지통, 안내판 류 및 수목 이름표 등)

·기타 시공에 필요한 사항 일체

④ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

① 설계 설명서

·냉난방시스템, 신·재생에너지 이용설비, 소방설비(기계), 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

② 시방서

·공사시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항 작성

·자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 제작 및 검사기준 등을 작성

③ 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오·배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

④ 도면종류

·도면 목록표

·건축 주요부분 평면도, 단면도

·범례

·기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

·배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

·계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

·평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

·단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

·기타 시공에 필요한 사항 일체

⑤ 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기

① 설계 설명서

·전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

·수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항 포함

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

·에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

② 계산서

·각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

·조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

·전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

·수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

③ 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

·자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명

·특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성 가능

④ 도면종류

·도면 목록표

·범례 및 시공상 유의할 특기사항 : 사용될 기호 특기사항

·배치도 : 각 건축물, 시설물의 배치 및 위치 평면도

·옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

·옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

·수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

·각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

·평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·기타 시공에 필요한 사항 일체

⑤ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

① 설계 설명서

·통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

·통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항 포함

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

·에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

·국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

② 계산서

·통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

·통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

·케이블 트레이 용량계산서 등

③ 공사시방서(시방서구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

·자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명

·특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성 가능

④ 도면종류

·도면 목록표

·범례 : 사용될 기호

·배치도 : 각 건축물, 시설물의 배치 및 위치 평면도

·옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

·통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

·각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

·각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

·각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

·각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·기타 시공에 필요한 사항 일체

⑤ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

7) 소방

① 설계 설명서

·소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

·화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

② 계산서

·각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

·소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

·소화수원량 산출서

③ 공사시방서(시방서구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

·자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명

·특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성 가능

④ 도면종류

·도면 목록표

·범례 및 시공상 유의할 특기사항 : 사용될 기호 특기사항

·배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

·평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

·주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

·각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

·단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·기타 시공에 필요한 사항 일체

⑤ 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

Ⅵ. 설계도서 납품목록
국토안전관리원 청사 건립공사 건축설계 용역
	1. 계획설계 납품도서 2. 중간설계 납품도서 3. 실시설계 납품도서

Ⅵ		설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	비고
1	계획설계 보고서	A3·A4	3	부	종합배치계획(스케치 및 스터디 모형 포함) 등 포함
2	관련법규 검토서	A4	3	부
3	현장조사 보고서	A4	3	부	지장물 현황 포함
4	측량성과도		3	부
5	유사시설 견학보고서	A4	3	부
6	공사비 검토서	A4	3	부	개략 공사비 검토

※ 위 납품도서 전부를 USB 및 CD로 제작하여 각 3개 제출한다.

※ 발주기관과 협의하여 납품도서의 종류, 규격, 수량 등을 조정할 수 있다.

2. 중간설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계 보고서	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○
2	설계도면	A3	3	부	○	○	○	○	○	○	○	전 공종 분리
3	내역서	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○	개략 공사비
4	계산서	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○
5	시방서	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○	특기시방 포함
6	설계 적정성 검토 조치 보고서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	한글
7	주요공법, 장비, 자재선정보고서	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○
8	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	3	부								일반등급
9	건축물 에너지효율 인증 관련 검토서	A4	3	부								1++등급
10	제로에너지 건축물 인증 관련 검토서	A4	3	부								5등급
11	장애물 없는 생활환경 인증 관련 검토서	A4	3	부
12	지질조사보고서	A4	3	부		○
13	예산절감방안 검토서	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○	예산초과시
14	공사기간 검토자료	A4	3	부
15	설계안전보건대장	A4	3	부	○	○	○	○	○	○	○

※ 건축도면은 전 공종(구조 등)을 포함한 전체본을 제본한다.

※ 토목·조경·기계·전기·통신·소방 도면은 각 공종별로 제본한다.

※ 위 납품도서 전부를 USB 및 CD로 제작하여 각 3개 제출한다.

※ 발주기관과 협의하여 납품도서의 종류, 규격, 수량 등을 조정할 수 있다.

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계도서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	1권으로 작성
2	설계 설명서	A3	5	부	○	○	○	○	○	○	○	전 공종 분리
3	설계도면	A1	5	부	○	○	○	○	○	○	○	반접이
		A3	5	부	○	○	○	○	○	○	○	반접이
4	계산서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○
5	내역서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	EXCEL
6	관급내역서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	EXCEL
7	수량산출서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	EXCEL
8	단가산출서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	EXCEL, 견적서 포함
9	일위대가표	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	EXCEL
10	공사시방서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	한글
11	특기시방서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	한글
12	관급시방서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	한글
13	설계 적정성 검토 조치 보고서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	한글
14	설계VE 검토 조치 보고서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	한글
15	조감도		3	부	○							표구 포함 (0.6m×0.9m 이상)
16	예정공정표		2	부	○	○	○	○	○	○	○	전 공종 포함
17	건축협의서		3	부								인허가 필증 등 증빙자료 포함
18	각종 예비인증서 등	·녹색건축 예비인증서, 건축물 에너지효율 예비인증서, 제로에너지건축물 예비인증서, 장애물 없는 생활환경 예비인증서 ·에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류, 신·재생에너지 설비 설치계획서 검토 관련 증빙서류 ·설계안정성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항 ·설계안전보건대장
19	공사계약요청자료	·공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file), 현장설명서, 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등
20	자재견본자료	A4	2	set								제품명, 색상, 규격 등 포함
21	손해배상보험증권											가입기간 : 3년

※ 위 납품도서 전부를 USB 및 CD로 제작하여 각 3개 제출한다(조감도 원본파일 포함).

나. 종결보고서에는 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술인 현황, 하도급자 현황, 수정·보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 예정공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성·제출하여야 한다. 출력물은 2부(A1 이하 규격)를 제출한다.

라. 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리 발주로 별도로 작성·제출하여야 한다.

마. 인허가 이행관련 납품 서류는 각종 관련법에 의거 인허가 절차 이행을 위한 각종 협의 도서 제출(관련법에서 정하는 첨부서류 및 관련부서에서 검토가 필요하다고 인정하여 요구하는 서류 일체)과 관련부서 협의사항 자료이다.

바. 녹색건축 인증, 건축물 에너지효율 인증, 제로에너지 건축물 인증 및 장애물 없는 생활환경 인증에 대한 예비인증서(보완사항이 없을 경우)는 발주기관의 특별한 사유가 있는 경우 협의 시점까지 해당 인증기관 접수증 등으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 설계용역비 중 일부(인증관련 업무대가 또는 합의금)의 지급을 유보할 수 있다.

사. 공사별 현장설명서(A4) : 발주기관 요구부수

- 조달청 홈페이지에 게재된 표준양식을 기준으로 작성하되, 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 하며, 관급자재 선정내용 등을 정확히 기재하여야 한다.

아. 참여기술인 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

자. 기타 발주기관이 요구하는 성과품

Ⅶ. 붙임
국토안전관리원 청사 건립공사 건축설계 용역
	1. 공간계획 및 시설조건 2. 책임기술인 선임계 3. 보안서약서 4. 주간공정보고 5. 월간공정보고 6. 하도급승인 요청서 7. (계획, 중간, 실시)설계 검사원 8. 표준설계관리일정표(예시) 9. 특정자재 사용리스트

[붙임 1] 공간계획 및 시설조건

공간계획 및 시설조건

1. 교육시설 및 체험시설

구 분			실당 인원 (인)	인당 면적 (㎡)	실당 면적 (㎡)	개수 (개)	면적 (㎡)
교육 시설	강당(부속실 포함)		300	2	600	1	600
	강의실		60	3	180	9	1,620
	강의형실습실		60	5	300	1	300
	분임토의실		60	3	180	1	180
	스튜디오				60	2	120
	전문위원실		2	10	20	2	40
	강사대기실		2	10	20	2	40
	휴게실(교육생)		321	2	97	1	97
	소계(A)						2,997
체험시설	안전체험공간		40	5	200	4	800
	전시공간		30	5	150	1	150
	VR 체험실	건설안전	30	7	210	1	210
		시설안전	30	7	210	1	210
	소계(B)						1,370
사무 /관리 시설	원장실		1	38.88	38.88	1	38.88
	사무실(실장)		1	17.92	17.92	1	17.92
	사무실		20	7.2	144	1	144
	회의실		20	3.5	70	1	70
	휴게실(직원)		20	2	40	1	40
	문서고				45	1	45
	창고				45	1	45
	소계(C)						401
편의 시설	식당(부속실 포함)		343		407	1	407
	매점				20	1	20
	카페테리아				40	1	40
	비즈니스룸		10	6	60	1	60
	소계(D)						527
공통 운영 시설	경비실				50	1	50
	방송통신실				50	1	50
	미화원실				45	1	45
	소계(E)						145
전용면적							5,440
공용면적							2,584
연면적(전용+공용)							8,024

* ±3% 내외 조정 가능(규모 변경시 발주기관과 협의)

2. 실습시설

가. 실습차량 차고지

- 차고지 : 실습용 진단차량* 6대 수용 규모

* 45인승 버스와 비슷한 크기

- 사무실, 창고, 화장실, 휴게실 및 샤워실 : 5인 근무를 고려

나. 품질시험실습실 : 60인 수용 및 시험기구 등 고려

다. 실습구조물

구분	구조물	규 모
건축	건축물	바닥면적 약 1,236㎡, 지하1층/지상3층
토목	교량	콘크리트교 및 강교 일부(각 높이 2.2m × 폭 4.5m × 연장 10.0m)
	터널	연장 10m 단선(폭 6.0m × 높이 8.0m)
	옹벽	역T형 옹벽 7m, L형 옹벽 7m, 보강토 옹벽 6m(합계 20m)
	상하수도	도복장 강관 및 덕타일 주철관 각 15m(관경 1000㎜~1500㎜), 밸브실
	도로	폭 7.0m(3.5m×2차선) × 길이 20m × 심도 4.0m

* 구체적인 사항은 발주기관과 협의하여 조정 가능

1) 건축물

구 분	주요내용
1. 규모	ㅇ (바닥면적) 약 1,236㎡ ㅇ (층수) 지하 1층, 지상 3층 ㅇ (구조) RC/S/SRC/PC/조적, 벽식/라멘식, 기초(독립/줄/온통/파일)
2. 환경조건	ㅇ 다양한 구조형식, 결함유형(휨균열, 전단균열, 박리/박락, 층분리, 재료분리, 누수, 백태, E/J 구현) 및 보수·보강(표면처리, 주입, 충전) 방안을 확인할 수 있도록 구성 ㅇ 다양한 내/외벽 마감 시공(드라이비트, 석재, 조적, C/W, 뿜칠, 도장, 천장마감) ㅇ 모든 공종은 중간 과정을 확인할 수 있도록 공정 단계별 구현 (예) 천장 : 내부 M-bar, 캐링 확인 (예) 방수 : 면정리, 프라이머, 1, 2차 확인 ㅇ 안전사고 발생 방지를 위한 안전시설물 완비(시스템 비계 올발판, 추락방지망, 환기구 덮개, 안전난간 등)

건축물 구성계획(예시)

건축물 구성계획(예시)

2) 교량

구 분	주요내용
1. 규모	ㅇ 콘크리트교 및 강교의 일부 구간 제작 - 상부구조(슬래브 및 거더)와 하부구조(교대 및 교각)의 접합부 - 높이 2.2m × 폭 4.5m × 연장 10.0m 규모의 실물 크기 모형(콘크리트교 및 강교 각 1개)
2. 환경조건	ㅇ (공통) 양 단부의 한 쪽은 교대, 다른 한 쪽은 교각으로 구성 ㅇ (콘크리트교) PSC I형 거더와 철근콘크리트 바닥판으로 구성 - 거더 2개와 가로보로 구성 - 균열(종방향/횡방향, 균열폭 0.3mm 이상/미만, 망상균열) 및 균열깊이 측정가능 구간 - 철근노출, 누수(등급별), 백태, 박락/박리, 재료분리 결함 - 탄산화깊이/염화물함유량시험 실습구간 ㅇ (강교) 강박스 거더와 강바닥판으로 구성 - 강박스 거더 내부 조명시설 설치 - 강박스 거더 격벽 설치(5.0m 간격) - 용접 결함부, 용접부 균열(U리브와 바닥판 사이 균열 등) - 강재의 변형(면외 변형), 보강재의 변형, 도막 및 부식 손상

교량(콘크리트교) 구성계획(예시)

교량(강교) 구성계획(예시)

3) 터널

구 분	주요내용
1. 규모	ㅇ 연장 10m 단선 터널(지상 설치) - 폭 6.0m × 높이 8.0m 규모의 실물 크기 모형
2. 환경조건	ㅇ 약 2m 간격으로 시공 단계별 제작 - 암모형에 락앙카 시공 / 숏크리트 / 방수지 / 철근배근 / 라이닝 ㅇ 내부 조명시설 설치 ㅇ 구조물 내 결함/열화 재현 - 시공이음부 1개소 이상 - 철근/무근 구간 - 구조물 배면 공동(스티로폼) - 균열(종방향/횡방향, 균열폭 0.3mm 이상/미만, 망상균열) 및 균열깊이 측정가능 구간 - 철근노출, 누수(등급별), 백태, 박락/박리, 재료분리 결함 - 탄산화깊이/염화물함유량시험 실습구간 - 터널 내부 측면 배수로 설치 ㅇ 보수공법 적용구간 및 신기술 적용구간 설치 - 균열보수공법 적용구간(표면처리, 주입 등) - 기타보수공법 적용구간(강판접착, 보강 섬유 접착 등)

구 분	주요내용
1. 규모	ㅇ 역T형 옹벽 7m, L형 옹벽 7m, 보강토 옹벽 6m(합계 20m)
2. 환경조건	ㅇ 터널을 지상에 설치하고, 양쪽 성토면(각 10m)에 옹벽 설치

터널 및 옹벽 구성계획(예시)

4) 상하수도

구 분	주요내용
1. 규모	ㅇ 도복장 강관 및 덕타일 주철관 각 15m 이상 - 강관 관경 1500㎜, 주철관 1000㎜ ㅇ 밸브실 1개소[제수밸브실 내 제수밸브(부제수밸브 포함), 공기밸브 및 신축관 설치, 폭 6.0m × 길이 6.0m × 높이 4.0m]
2. 환경조건	ㅇ 관로 손상 유형 재현 - 노출관 : 관종별 0.3m×0.3m 부위 도장 제거 후 수분 접촉 등 부식환경 조성 - 매설관 : 강관 0.3m×0.3m 부위 도장 제거 ㅇ 구조물(밸브실) 내 결함/열화 재현(터널 참고) - 철근/무근 구간 - 균열(종방향/횡방향, 균열폭 0.3mm 이상/미만, 망상균열) 및 균열깊이 측정가능 구간 - 철근노출, 누수(등급별), 백태, 박락/박리, 재료분리 결함 - 탄산화깊이/염화물함유량시험 실습구간 ㅇ 강관 전기방식 설비 설치 ㅇ 밸브실 상단 안전펜스 설치 ㅇ 관로 및 밸브실 내부 조명시설 설치

상하수도 구성계획(예시)

5) 도로

구 분

주요내용

1. 규모

ㅇ 폭 7.0m(3.5m×2차선) × 길이 20m × 심도 4.0m

- 이상대구간 하부에 매설물 변형 방지를 위한 콘크리트 구조물(토조, 3.5m×20m×4.0m 규모의 내부가 빈 상자 형태) 설치

2. 환경조건

ㅇ 차량의 진출입 및 회차 가능(차량형 GPR탐사장비 활용)

ㅇ 도로포장(아스콘포장 10㎝, 기층 20㎝, 보조기층, 원지반)

ㅇ 도로용 스프링클러(습윤상태 표현)

ㅇ 도로 하부 지하시설물 및 환경 재현(관로, 맨홀, 공동, 지반이완 등)

- 양호상태 및 이상대구간 각 1개 차선

ㅇ 이상대구간 세부조건

매설물 종류	규격(m)	개수	비고(심도)
관로(종·횡단)	D0.9 등	8	1m∼1.5m
맨홀	D0.9 등	2	-
공동(스티로폼)	0.5×0.5×0.5 등	6	∼0.5m, 1.0m, 1.5m∼
지반이완 (스티로폼+자갈)	2.0×1.8×0.5	1	0.5m

ㅇ 우천시 토조 내 배수 해결

도로 구성계획(예시)

[붙임 2] 책임기술인 선임계

책임기술인 선임계

1. 용  역  명 : 국토안전관리원 청사 건립공사 건축설계 용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202  .   .   .

4. 착수  일자 : 202  .   .   .

5. 완수예정일 : 202  .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술인으로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술인이 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 기술자격증 및 경력증명서 사본 1부

202  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

국토안전관리원장 귀하

[붙임 3] 보안서약서

보 안 서 약 서

○ 용  역  명 :

○ 계약  일자 : 202  .   .   .

○ 착수  일자 : 202  .   .   .

○ 완수예정일 : 202  .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 서약서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 발주기관에게 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202  년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

국토안전관리원장 귀하

[붙임 4] 주간공정보고

주간공정보고

�용 역 명 :

�용역개요

◦용역기간 : 202  년  월  일 ～ 202  년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

�용역진행사항

구 분	전주진행사항 (202 . . .)	금주예정사항 (202 . . .)	차주예정사항 (202 . . .)	공정률
업무 내용	ㅇ인원투입현황 ㅇ외주작업진행현황 등 ㅇ주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 ㅇ건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분 작성			실시공정/예정공정(%)을 표기
특기 사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술인 :           (인)

국토안전관리원장 귀하

[붙임 5] 월간공정보고

월간공정보고

�용 역 명 :

�용역개요

◦용역기간 : 202  년  월  일 ~ 202  년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

�용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술인 :           (인)

국토안전관리원장 귀하

[붙임 6] 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 : 국토안전관리원 청사 건립공사 건축설계 용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202  .   .   .

4. 착수  일자 : 202  .   .   .

5. 완수예정일 : 202  .   .   .

-  아      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임  1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술인 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게 설계용역 중 ○○○분야를 하도급하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

국토안전관리원장 귀하

[붙임 7] (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용  역  명 : 국토안전관리원 청사 건립공사 건축설계 용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202  .   .   .

4. 착수  일자 : 202  .   .   .

5. 완수예정일 : 202  .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

국토안전관리원장 귀하

[붙임 8] 표준설계관리일정표(예시)

[붙임 9] 특정자재 사용리스트

특정자재 사용리스트

품 목	규 격	단위	물량	금액(천원)	사 유 (효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등)

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외

확인자   책임기술인   ○ ○ ○  (서명)