[문화예술교육 전문 연수원 리모델링 건축설계] 과업내용서

2025. 4.

목 차
Ⅰ		과업개요
	1		과업 개요								3
	2		과업 내용								5
Ⅱ		과업 일반지침
	1		설계과업의 기준								7
	2		설계과업 일반사항								7
	3		설계자 유의사항								10
	4		법령 등의 적용 및 시방서 작성 기준								13
	5		설계 진행 시 제출서류								15
	6		업무보고 및 회의								17
Ⅲ		기술지침
	1		설계 기본방향								20
	2		관급자재 및 주요자재 선정								21
	3		배치계획								22
	4		건축계획								22
	5		구조								23
	6		기계설비								24
	7		전기 및 정보통신								25
	8		소방								27
Ⅳ		설계도면 작성 요령
	1		설계도서의 분리작성								28
	2		설계도면 표기								28
	3		도면작성								28
	4		기타 성과품의 작성								29
Ⅴ		설계도서 납품목록
	1		최종 성과품 종류 및 납품부수								34
	2		설계도서 작성 시 유의사항								36
Ⅵ		관련 서식									38

Ⅰ

과업개요

1. 과업 개요

▲ 설계범위(후생관 6-7층) 전경

▲ 구)충남도청사 건물현황 및 조성대상지 위치

가. 위치 및 규모

- 건 물 명: 구)충남도청사 후생관

- 소 유 자: 문화체육관광부

- 대상위치: 대전광역시 중구 선화동 287-2

- 준공일자: 1991년 6월

- 지역지구: 일반상업지역, 방화지구, 시가지경관지구, 원도심 중점경관관리구역

- 시설용도: 업무시설-사무실 등 ※ 추후 ‘교육연구시설’ 용도변경 필요(~`25년)

- 높    이: 27.2m ※ 건축물 최고 높이

- 층    수: 지하 1층, 지상 7층

- 구    조: 철근 콘크리트 (1990년 허가 당시 내진설계 적용됨)

- 외벽재료: 외장타일

- 대지면적: 25,456㎡

- 연 면 적: 7424.71㎡

- 대상면적: 1,870.78㎡(지상6층: 935.39㎡ / 지상7층: 935.39㎡)

- 주차대수: 전체 278대 중 후생관 35대(대장지 내 기존 부설주차장 활용)

- 층별개요

층수	면적(㎡)	용도		비고
지상7층	935.39	업무시설	(강의실) ※ 용도 변경(교육연구시설)예정	설계 범위
지상6층	935.39	업무시설	(강의실, 컴퓨터실, 강사휴게실) ※ 용도 변경(교육연구시설)예정
지상5층	935.39	업무시설	(미술실, 공예실, 의상실, 실습실)	-
지상4층	935.39	업무시설	(세미나실, 전통학습실, 강의실)	-
지상3층	935.39	업무시설	(대전평생교육진흥원 사무실)	-
지상2층	935.39	판매시설	(조리실, 제과제빵실, 식문화실, 도우미쉼터)	-
지상1층	891.47	판매시설	(안내데스크, 로비, 컨퍼런스홀, 북카페)	-
지하1층	920.9	판매시설	(기계실)	-

나. 과업기간: 계약 후 150일(공휴일 포함)로 한다.

단, 한국문화예술교육진흥원(이하‘발주기관’이라 한다)의 요구로 추가용역이나 기타 계약상대자(이하‘설계자’라 한다)의 귀책사유가 아닌 설계기간의 연장이 필요할 시에는 기간을 연장할 수 있으며, 발주기관의 사정에 따라 설계 단계별 기간은 조정할 수 있다.

·계획설계(사전협의 및 준비기간 포함): 45일(30%)

·중간설계: 45일(30%)

·실시설계(인허가, 조달청 설계 적정성 검토, 각종 협의·심의기간 포함): 60일(40%)

다. 예정공사비: 약 3,450백만원(부가가치세 포함)

1) 제시된 공사비는 건축(리모델링, 인테리어 포함, 이하 ‘건축’), 구조, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방, 폐기물처리, 철거(해당시) 등에 대한 공사비이며, 각종(가스/수도 등)인입비, 시설분담금 등을 포함한 공사비다.

※ 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음

2) 공사예정가격은 공사비 예산액을 초과하여 작성할 수 없다.

3) 공사비 조정 협의 시 관련 자료를 검토 및 작성하여야 한다.

라. 예정설계비: 약 231백만원(부가세 및 제경비 포함)

1) 설계비는 건축, 구조, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거(해체설계, 해당 시), 인테리어(가구계획, 색채계획, 조명계획, 사인디자인, 특수장비 구축 설계)등을 포함한다. 또한 제안된 계획에 따라 주요구조부의 변경이 발생되는 경우에는 내진보강설계, 설계안전성 검토 등을 업무에 포함한다.

2) 설계의도구현 업무는 설계용역 완료 후 별도 용역으로 계약 체결한다.

3) 과업에 필요한 각종 심의, 인·허가(협의), 신재생에너지 설치신고(필요 시) 등의 제반 행정절차를 용역비에 포함한다.

※ 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.(기술용역계약 일반조건 등 참조)

마. 주요과업

1) 대상지(대상 건물 6,7층) 건축 리모델링 및 인테리어 등 반영한 설계

2) 건축, 구조, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방분야 등 리모델링 공사에 필요한 전체 설계와 상위계획 및 관련법에 의한 일체의 설계

3) (해당시)기존 건축물(시설물) 철거와 관련된 설계(해체설계 및 내진보강설계 포함)

4) 인테리어설계(가구계획, 색채계획, 조명계획, 사인디자인 등 포함)

5) 구조검토 및 인·허가 업무 ※ 본 용역과 관련한 제반 인·허가 일체 업무

6) 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 수행한다.

2. 과업 내용

가. 과업의 범위

1) ‘문화예술교육 전문 연수원’을 위한 리모델링 공간 조성을 위한 설계용역으로 건축(리모델링, 인테리어 포함, 이하 ‘건축’), 구조, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방 등을 위한 설계를 포함한다.

2) 사업추진과 관련한 각종 위원회 자문․심의, 인․허가, 영향평가, 입찰, 계약 등 제반 행정절차(건축협의 등) 이행 및 이에 따른 협의, 보고, 관련 도서 및 필요도서 작성 및 제출, 조달청 설계 적정성검토 등에 필요한 업무를 포함한다.

※ 인·허가 관련 각종 용역 필요 여부 검토 포함한다.

① 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 설계자가 대행하여야 한다.

② 설계자는 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성(설계 예정공정표 포함)하여 제출하여야 한다.

※ 계획설계, 중간설계, 실시설계 각 단계별 설계공정계획을 수립하여야 한다.

③ 설계자는 향후 공사 준공 시 해당 허가권자에게 통보하는 관계도서 작성, 인장날인 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

④ 설계자는 향후 준공 시 건축물대장 생성 및 세움터 개설 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조한다.

⑤ 설계자는 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

⑥ 설계자는 본 용역이 완료된 후, 관련사항에 대하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조한다.

3) 구조검토를 통해 변형이나 하자가 발생되지 않도록 내구성과 구조의 안전성을 확보해야한다.

4) 녹색건축물 조성 지원법에 따른 에너지 절약계획서 검토를 실시한다. 필요시 녹색건축, 제로에너지건축물 인증(법정등급 이상) 및 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 취득 여부 등을 검토하여야 하며, 미 해당 시에도 이에 준하여 설계를 이행한다.

5) 각종 측량, 실측 및 지장물에 관한 조사 등의 결과를 반영한다.

※ 기존 건축물을 리모델링하는 과업으로 현황실측을 진행하여 변경전,후 도면을 완성한다.

※ 필요시 대지 현황측량 및 지장물 조사를 과업에 포함하여, 비용은 별도 실비정산한다.

6) 건설기술 진흥법에 따른 설계용역평가 자료 작성·제출 및 평가업무 수행한다.

7) 사업추진 단계별로 진행되는 협의․조정 시 필요한 각종 기술적 증빙자료의 작성 및 보조업무를 진행한다.

8) 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 설계자의 협의여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 시 발주기관의 해석에 따른다.

9) 「건설기술진흥법」제75조의2에 따라 해당시 설계안전성 검토 보고서를 작성하여야 한다.

나. 과업의 특수성

1) 건축물 용도가 건축법상 ‘업무시설’이‘교육연구시설’로 변경되는 점을 감안하여 관련 법령검토 및 일체의 준수가 필요하다.

2) 현재 건축물을 리모델링하여 시설을 조성하여야 한다.(필요시 공간구성에 따른 법적 연면적의 감소는 일부 허용한다.)

3) 요구프로그램에 따라 가급적 기존건축물의 주요구조부 변경없이 최대유효높이를 확보하는 방안을 제안하나, 예정공사비 내에서 건축물 높이 증축이 가능하다면 제안은 가능하다. 단, 이에 따른 구조의 안전, 내진보강설계 및 해체설계, 설계안전성 검토 등을 포함하여 설계에 반영하여야 한다.

※ 구조안전진단보고서(2024) 참고, 내진성능평가는 별도 자료제공 예정

4) 계약자는 중요한 사항의 결정을 위하여 발주기관 및 문화체육관광부와 협의하여야 하며, 협의 결과를 설계에 반영하고, 보고서로 제출하여야 한다.

Ⅱ

과업 일반지침

1. 설계과업의 기준

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건축법, 관련 지침 등 관계 규정

나. 설계용역 계약서, 계약조건 및 설계공모 지침서, 과업내용서

다. 공공건축 사전검토, 공공건축 심의위원회 및 자문위원회, 관계 법령에 의한 기술심의위원회 등의 수정ㆍ지시사항

라. 기타 발주기관이 필요하다고 인정한 문서 및 도서

마. 설계도서 작성기준은『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [국토교통부고시 제2020-635호]』,『설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침[국토교통부고시 제2021-981호] 적용

2. 설계과업 일반사항

가. 업무수행

1) 설계자는 발주기관과 문화체육관광부 등 관련 부서와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토·반영하여야 한다.

2) 설계자는 설계자문위원회, 분야별 기술심의위원회, 자문회의, 보고회를 개최할 시 자료를 제출하여야 하며 회의에 참석하여 설명하고 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변하도록 하고 회의 결과에 대하여 설계에 적극 반영하여야 한다.

3) 설계자는 발주기관이 설계와 관련한 기타 용역을 수행하는 경우 상호 협조하여야 하며, 필요시 단계별 설계도서를 제공하고 설계진행 과정과 설계변경 사항을 사전협의하여 설계 정합성을 확보하여야 한다.

4) 설계자는 발주기관이 요청하는 용역 관련 자료를 신속히 제출하여야 하며, 과업내용서에 명시된 성과품들을 지정된 납기 내에 작성 제출해야 한다.

5) 설계자는 본 용역수행으로 알게 된 비밀 보안사항에 대하여 과업 시행중은 물론 과업 종료 후에라도 비밀보안 준수 및 다음 사항에 대한 책임을 진다.

① 설계자는 본 용역수행 중 보안대책에 있어서 책임을 진다.

② 설계자는 본 용역수행 중 타 행정기관 또는 타 업체로부터 협조 요청을 받았을  때에는 발주기관의 사전 승인을 받아 타 기관의 협조에 응하여야 한다.

6) 설계자는 제시된 예정공사비를 초과해서 설계할 수 없다. 다만 다음 사항 발생 시 그 사유와 대안을 기재한 서류를 제출하고 정당성을 설명하여 발주기관과 협의하여야 한다.

① 중간설계상의 예정공사비가 설계공모에서 제시한 예정공사비와 다를 경우

② 실시설계상의 예정공사비가 중간설계 시 제출된 예정공사비와 다를 경우

7) 설계관련 현황조사

① 설계자는 현황조사 시 이동 동선, 각종 설비시설 등에 대한 실사를 하여 내․외부 마감 시설의 설치, 철거 용역의 모든 단계에서 관련 규정에의 적법 여부를 검토하고 해결책을 제시하여야 한다.

② 설계자는 기존구조물로 인하여 공사내용의 변경, 추가 등이 발생하지 않도록 상세한 현장조사를 통해 이를 설계 및 내역에 반영해야 한다.

8) 본 과업지시서에 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 정한다.

9) 본 과업지시서에 대한 대안을 제시할 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인 후 채택할 수 있다.

10) 모든 설계도서에 사용되는 단위는 KS규격을 우선하며, ISO규격을 준용하고 단위는 MKS로 한다.

11) 「범죄예방 건축기준 고시」를 참고하여 방범에 적합한 구조로 설계한다.

나. 하도급 계약

1) 설계자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급(기술제휴, 기술협력 포함) 할 수 없으며, 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같고, 각종 법령에서 정하는 하도급의 적정성이 보장되어야 한다.

① 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

② 구조계산 및 검토 업무(필요시, 내진보강설계 포함)

③ 건설공사의 수량산출 및 견적업무

④ 건축구조, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방 등 분야 업무

⑤ 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

2) 설계자는 발주기관이 인정하는 업무에 대하여 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 이 경우 하도급자의 설계실적, 자격요건 및 참여인원, 하도급 계약 예정일 등이 포함된 하도급업체 명부를 당해 용역 착수 전에 발주기관에 제출하여 사전 승인을 받아야 한다. 설계자가 부득이한 사유로 이를 변경하고자 할 경우에도 사전 승인을 받아야 한다.

다. 과업 범위의 변경 및 설계비 정산

1) 본 용역을 수행함에 있어 용역 내용의 변경이 필요할 때에는 설계자는 서면 요청에 의하여 변경 처리하여야 한다. 단, 경미한 변경은 추가 비용을 요청할 수 없으며 상당한 설계 내용의 변경 시에는 상호 협의에 의하여 별도 처리할 수 있다.

2) 과업수행 중 방침 변경 또는 설계 과업량이 증감되는 경우 상호 협의하여 계약 내용을 변경토록 하고, 그에 따른 계약금액을 조정할 수 있다.

① 발주기관의 과업 내용 변경 요구가 있을 경우

② 기타 발주기관에서 필요하다고 인정하여 변경하는 경우

3) 설계비의 정산은 납품도서의 내역서에 의해 정산하되 계약금액을 초과할 수는 없으며, 설계자는 본 과업을 수행함에 소요되는 모든 부대비용은 설계자 부담으로 시행한다.

라. 사업 승인 등의 서류작성 및 인허가 절차 이행

1) 설계자는 설계기간 또는 완료 후에라도 공사 착공에 필요한 제반 행정절차(심의, 인 ․ 허가 등)가 조속히 처리될 수 있도록 적극적인 노력을 하여야 하며 이를 수행함에 있어 발주기관이 요청하는 사항 및 행정 절차상 필요한 사항이 있을 시에는 이를 완벽하게 보완하여야 한다.

2) 설계자는 상기 행정절차에 대하여 용역 완료 후에라도 미진한 사항에  대해서는 다음과 같이 발주기관의 지시에 따라야 한다.

① 본 과업의 완료 후에라도 본 용역에 관련된 사항에 대하여 보완이 필요할 때에는 이를 보완하여 제출하여야 한다.

② 발주기관의 승인 협의를 거친 사항이라도 추후 계획, 설계상의 잘못이 발견될 시는 추가 용역비의 청구 없이 설계자의 책임 하에 수정, 보완하여야 한다.

③ 용역수행의 잘못으로 인하여 사업계획 집행 중 재난이 발생하였을 때에는 설계자는 이에 상응하는 책임을 져야 하며, 발주기관은 관련 법령에 따라 합당한 조치를 할 수 있다.

마. 성과품의 소유

1) 본 용역 수행으로 인하여 생산된 각종 설계도서와 조사자료 등 일체의 성과품의 소유권과 저작권 등과 관련한 제반사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

2) 지식재산권 등에 대한 귀속은 용역계약일반조건 및 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따른다.

3) 본 용역 수행에 관련되어 설계자가 제공하는 제3자의 특허권이나, 저작권 주장으로 인한 발주기관 또는 그 지정인에게 소송 또는 배상청구가 제기되는 경우 설계자는 발주기관의 권리, 소유권 이익을 보호해야 하며 여하한 손실이나 손해 등을 받지 않도록 조치해야 한다. 만일, 그러한 소송, 소송절차에 의해 용역의 전체 혹은 일부가 특허 등의 침해 사실이 있는 것으로 판결되면 설계자는 즉시 설계자 비용으로 동 용역에 사용될 수 있도록 특허권 등을 구매 또는 대체하여야 한다.

4) 발주기관은 설계도서 대해 설계자와 별도의 보상 및 협의 없이 상업적 이익을 목적으로 하지 않는 콘텐츠 관련 사업(아카이빙, 저작물의 복제, 전시, 배포, 공중송신, 2차 저작물 작성)과 전시 및 출판물에 이용할 수 있다. 설계자는 이에 적극적으로 협조하여야 하며 이에 동의한 것으로 간주한다.

바. 납품

1) 납품은 계획설계, 중간설계, 실시설계 3회를 기본으로 한다. 다만, 설계용역 기간 등에 따라 납품회수와 납품도서 작성방법, 부수는 본 설계지침에서 정하는 바에 따르거나, 발주기관과 협의한다.

3. 설계자 유의사항

가. 일반 사항

1) 설계자는 본 설계의 과업수행을 위해 적용되는 관계 법규를 면밀히 검토하여야 하며, 과업내용서에 일부 법령의 오류나 누락이 있을 경우, 현행 관계 법규를 따르는 것을 원칙으로 한다. 이와 관련하여 설계자는 이의를 제기할 수 없다.

2) 본 과업내용서에 지시된 사항은 설계자 임의로 해석할 수 없으며 내용이 불분명하거나 필요 사항이 누락된 경우에는 발주기관과 사전 협의 조정한 후 과업을 수행하여야 한다.

3) 설계자는 본 과업을 수행함에 있어 관련 법규의 기준 및 본 과업내용서에 의거 합리적으로 과업을 수행하여야 하며, 과업내용서에 의문사항이 있을 시에는 발주기관과 사전 협의 조정한 후 과업을 수행하여야 한다.

4) 본 과업내용서의 내용과 다른 기준의 내용이 상이한 경우에는 본 과업내용서의 내용을 우선하며, 과업수행에는 필요하나 관련 법규 및 과업내용서에 누락된 사항은 발주기관과 사전 협의하여 결정하여야 한다. 단, 누락된 경미한 사항은 설계자 부담으로 시행하여야 한다.

5) 설계자는 본 과업 수행 시 수집한 자료와 관계기관에 제시할 기초자료에 대하여는 발주기관과 충분히 협의하여 설계에 착오가 없도록 하며, 본 과업에 활용된 모든 참고자료 목록은 설계 설명서에 첨부되어야 한다.

6) 설계자는 본 용역을 수행함에 있어 발주기관이 별도 시행하는 관련 다른 용역의 성과물과 부합되도록 설계하여야 한다.(해당 시)

7) 자문회의 의견 반영을 위하여 필요한 경우 기존 제안공모에 제출되었던 설계(안)은 수정될 수 있으며 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

8) 설계자는 심사위원회 심사과정에서 토의되었던 내용과 권고사항에 대하여 면밀히 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

9) 설계자는 본 계약에 의한 설계를 수행하는데 설계품질 보증을 위해 성과품의 제출목록, 발주기관 의견 반영 및 확정 방법 등이 포함된 시행계획서를 용역 착수계 제출 시에 제출하여 발주기관의 승인을 얻은 후 설계품질 확보에 노력해야 한다.

10) 설계자는 실시설계 단계에서 설계 적정성 검토 1회(법적사항) 이상 받아야 하며, 그 결과를 설계에 반영하여 계획을 완료하여야 한다.

11) 녹색건축, 제로에너지건축물, 장애물 없는 생활환경인증(BF)은 인증대상은 아니나 발주기관과 협의하여 반영한다.

12) 해당 시 설계안전성 검토를 받아야 하며, 그 결과를 설계에 반영하여 계획을 완료 하여야 한다.

나. 계약서와의 관계

1) 발주기관과 설계자는 계약 내용의 이행에 상호 책임을 진다.

2) 발주기관의 승인으로 과업 내용 변경 시 계약 변경

① 발주기관은 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 설계자는 발주기관의 승인이 없는 한 계약을 위반할 수 없다.

② 과업 내용의 변경은 발주기관과 설계자가 문서화하여 상호 승인하여야하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

③ 계약서 및 본 과업내용서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관과 설계자가 상호 협의하여 결정하기로 하며, 이때 과업 내용의 변경이 발생할 때는 “2)”항에 따른다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계자는 계약서에서 정한 기간 내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반할 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생하는 설계 변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 관계법령에 따라 설계자가 부담(배상)하고, 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하는 경우 지체 없이 이행해야 한다.

3) 계약의 수행 중 계약당사자 간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계 법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 중재에 대해서는 발주기관과 설계자 간 서로 중재합의가 있어야만 가능하며, 분쟁 기간 중이라 할지라도 설계자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

4) 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불이행, 구조적인 모순, 특정업체 제품 명기 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는 관계법령에 따라 설계자가 일체의 책임을 져야 한다.

5) 다음 경우에는 과업기간을 정지하거나 변경할 수 있다.

① 용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

② 용역계약일반조건 제24조(불가항력)

③ 용역계약일반조건 제32조(용역의 일시정지)

④ 용역계약일반조건 제32조의 2(계약상대자의 용역정지 등)

⑤ 수요기관의 사업계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

6) 설계자는 용역 착수 시 관련 규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

① 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

② (계약예규) 용역계약일반조건 제41조

③ 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제16조, 제16조의2, 제16조의3, 제16조의4

④ 엔지니어링산업진흥법 제31조 및 같은 법 시행령 제42조

⑤ 건설기술 진흥법 제34조 및 동법 같은 법 시행령 제50조

⑥ 건축사법 제20조 및 같은 법 시행령 제21조

라. 관계 기술자의 협력

1) 건축법 시행령 제91조의 3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따라 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

마. 기타

1) 설계자는 각종 인허가를 용역 완료 전에 이행하여야 하며 인허가 시 조건 또는 부과사항은 보완하여 납품하여야 한다.

2) 발주기관이 과업 수행 중 하도급자나 설계 참여자가 과업수행에 부적합하다고 인정될 때에는 즉시 교체를 요구할 수 있으며 설계자는 이에 응해야 한다.

3) 설계자는 작업 현황에 대하여 과업추진 내용을 작성 주간, 월간으로 보고하여야 한다.

4) 발주기관은 과업의 계획, 중간 최종단계에서 보고회를 개최할 수 있으며 설계자는 그에 따른 제반 준비를 하여야 한다.

5) 설계자는 과업 종료 후 별도계약을 체결하여 설계의도구현업무 및 사후설계관리업무에 협조하여야 한다.

※ 설계가 완료된 후 공사시공 과정에서 건축사의 설계 의도가 충분히 반영되도록 설계도서의 해석, 자문, 현장 여건 변화 및 업체 선정에 따른 자재와 장비의 치수·위치·재질·질감·색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토·보완 등을 위하여 수행하는 설계업무를 말함

4. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준

가. 법령 등의 적용기준

1) 설계자는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하‘국토법’이라함), 문화재보호법, 건축법, 소방법 등 관련 법규 및 해당 지자체의 조례 상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약 이행에 문제가 있을 경우 이에 대한 내용을 관련 기관과 문서로 협의하여야 한다.

2) 본 설계용역의 성과품은 기술(설계)용역계약특수조건 제11조(법령 등의 준수)에 의거 아래 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업에 관련 있는 관련법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

- 건축법

- 건축사법, 국가기술자격법

- 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 산업안전보건법, 엔지니어링산업진흥법

- 국토법(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등)

- 수도법/하수도법, 시행령 및 시행규칙

- 도로법 시행령 및 시행규칙

- 소음진동규제법 시행령 및 시행규칙

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

- 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술 기준

- 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법, 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙, 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

- 소방기본법, 소방시설공사업법, 화재예방·소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 화재안전기준

- 주차장법

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

- 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙

- 지진·화산재해대책법

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

- 건축물의 에너지절약 설계기준

- 고효율 에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정

- 녹색건축물 조성 지원법

- 에너지이용 합리화법

- 제로에너지 건축물 인증에 관한 규칙

- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정

- 신재생에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

- 건축물의 범죄예방 설계 가이드라인

- 예산회계 관련 법규 및 감사원법 관련 규정

- 대전광역시 자치법규 등

3) 설계도서의 작성방법은 건설기술 진흥법 제48조(설계도서의 작성 등), 같은 법 시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 건축물의 설계도서 작성기준, KSF1501: 건축제도통칙, KSF1505: 건축구성재의 기본공차, KSF1509: 건축부품의 치수정하기 등 관련 규정에 의한다.

※ 설계도서 작성 중 이의가 있을 경우, 발주기관과 협의 후 후속작업 실시

나. 시방서 작성 기준

1) 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장 조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제할 필요가 있을 때에는 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

2) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 작성한다.

3) 특기시방서는 자재관련시방(각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

5. 설계진행 시 제출서류

가. 착수 시 제출서류 ※ 계약일로부터 7일 이내 다음 서류 2부를 발주기관으로 제출

1) 착수 계획서 1부 ※ 공문 포함

2) 책임기술자 선임계 1부(기술자격증 사본, 경력증명서 등 포함)

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

- 설계사의 공식 대표자, 용역 총괄책임자, 용역 관리책임자, 분야별 책임자의 직무 명세서와 이력서 및 참여 인력의 직무 명세서 등

※ 공동, 분담이행일 경우 대표자 선임계 제출, 하도급 공종은 하도급승인요청서에 첨부

4) 과업수행계획서 1부 ※ 다음 사항을 포함하여 제출, 발주기관의 승인 필요

① 세부작업 업무절차 및 설계추진 조직표(연락처 포함): 사업책임기술자(책임건축사) 및 각 공종 분야별 책임기술자는 주요 협의회에 항상 참석 가능한 기술자 배치

② 설계자와 설계자의 국․내외 협력사 혹은 기술제휴 회사 간 세부업무분장 내용 및 하도급 대상 명부

5) 각 공종(건축, 구조, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단(경력증명서, 재직증명서 포함), 업무내용, 소지한 기술자격증 사본 등 각 1부

6) 설계용역 예정공정표(공정률에 의한 총괄 공정표) 1부

7) 계약금액(설계용역비)에 대한 산출내역서 1부

※ 분담이행자 용역수행 내역서, 사후정산항목 포함

8) 하도급 예정 현황 1부 ※ 하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출

9) 인력, 장비투입 예정현황 1부

10) 보안각서 각 1부 ※ 보안계획서 포함

11) 계약이행보증증권 ※ 보증기간은 실시설계 완료일(계약일)까지 산정

12) 기타 발주기관에서 필요하다고 인정하는 사항

※ 설계자는 승인된 총괄 예정공정표(설계, 공사)에 의한 분야별 세부공정표를 발주기관에 제출 필요

나. 계획설계 시 제출서류

1) 설계검사원

2) 설계공모안(설계 제안서)를 기초로 하는 계획설계도서(설계보고서, 도면)

※ 각종 비교검토서 포함

3) 관련 법규 검토서 ※ 건축법 등 인허가를 득하기 위한 기타 관련 법 포함

4) 현장조사 결과보고서 1부

5) 현황측량 성과도 및 관련 보고서 1부 ※ 필요시, 발주기관 사전협의

6) 유사시설 견학보고서 ※ 발주기관 사전협의

7) 관련서류를 포함한 USB

8) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

다. 중간설계 시 제출서류

1) 설계검사원

2) 중간설계도서(설계보고서, 도면)

3) 구조계산서

4) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서 ※ 대안제시 및 선정사유, 예산비교 등

5) 건축협의(허가 등)도서

6) 에너지절약계획 관련 검토서 및 자료 ※ 해당 시 제출

7) 공종별 개략공사비 검토서 ※ 각 공정 책임기술자가 확인한 예산분배

8) 설계검사원

9) 관련서류를 포함한 USB

10) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 실시설계 사전 검토용 도서

※ 총괄 예정공정표상의 제출일까지 발주기관과 사전협의 후 제출

1) 실시설계 도면 및 보고서

2) 총괄원가계산서, 내역서, 산출서, 견적서 등

3) 시방서(표준시방서, 특기시방서)

4) 각종 계산서(구조계산서 및 부하계산서 등)

5) 공사예정공정표

6) 국고보조금통합관리지침에 따른 설계 적정성 검토를 위한 도서

7) 공종별 공사비 내역서: 예산초과 시 예산절감방안 검토서, 증가요인 검토서

8) 공사예정공정표

9) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 훈령)에 따른 공사 기간 검토자료 ※ 공공 건설공사의 공사기간 산정기준 산출근거 포함

10) 설계안전성 검토 보고서 ※ 건설기술진흥법 제757조의2 관련

마. 실시설계 시 제출서류

1) 설계검사원

2) 실시설계도서(설계보고서, 도면, 계산서, 내역서, 시방서 등)

3) 완료보고서

4) 건축협의서 제반 ※ 인허가 증빙자료 포함

5) 에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류(해당시)

6) 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 훈령)에 따른 공사기간 산정자료

7) 사후정산 항목 정산자료

8) 손해배상보험증권 ※ 보증기간은 공사 준공예정일까지 산정

9) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

10) 설계안전성 검토 보고서 ※ 건설기술진흥법 제757조의2 관련

바. 설계적정성검토 반영결과 제출 ※ 해당 시 VE 및 공사기간산정 검토 포함

1) 설계적정성검토, 확인, 반영된 설계도면

2) 설계적정성검토, 확인, 반영된 시방서

3) 설계적정성검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

4) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 자료

사. 공사계약 관련 요청자료

1) 공사개요서 ※ 공사예정공정표에 의한 공사기간(총차/금차) 포함

2) 총 공사원가계산서

3) 내역서(xls, xml), 견적서(pdf)

4) 관급자재 목록 ※ 관급 심의 결과 변동사항 포함

5) 설계도서

아. 기타 서류

1) 용역의 진도보고(기술(설계)용역계약특수조건 제8조)

① 주간공정보고 ※ [서식 5]

② 월간공정보고 ※ [서식 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

6. 업무보고 및 회의

가. 업무보고

1) 주간업무

- 매주 협의된 날 서식에 맞춰 발주기관 감독관에게 전자우편으로 제출한다.

- 책임기술자 확인과 각 공종별 진행상황(중간설계 이후)이 포함되어야 하며, PDF파일로 제출한다.

2) 월간업무 ※ 수정예정공정표 필요시 포함

- 매월 말일 기준으로 발주기관과 협의된 날까지 전자우편으로 제출한다.

- 업무수행사항 및 예정사항을 서식에 맞춰 작성하여 제출한다.

3) 수시업무

- 설계용역 중 문제점 발생 시에는 내용을 분석하여 사전협의 후 제출한다.

나. 업무협의

1) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 설계자 혹은 분야별 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

2) 설계자는 본 과업내용서에 대한 대안을 제시할 수 있으며, 그에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택될 수 있다.

3) 발주기관은 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출 요구하여 수정ㆍ보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

4) 설계자는 자문회의 등 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의 장소와 참석 범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 함께 회의에 참석토록 하여야 한다.

5) 설계자는 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적․보완․수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이를 최대한 반영하여야 한다.

다. 업무회의

1) 업무착수회의

- 발주기관과 일자를 협의하여 착수일로부터 7일 이내에 개최한다. 회의 시, 설계자는 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명해야 한다.

2) 계획설계 보고회

- 설계자는 계획설계 완료 7일 이전에 계획설계(안)을 작성하여 해당 보고회 개최 3일 전까지 발주기관과 사전 협의를 거친 후 보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

3) 중간설계 보고회

- 설계자는 중간설계 완료 7일 이전에 중간설계(안)을 작성하여 해당 보고회 개최 3일 전까지 발주기관과 사전협의를 거친 후 보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4) 최종 보고회

- 설계자는 설계용역 완료일 7일 이내에 최종 납품한 보고서를 기준으로 보고 자료를 별도 작성하여 해당 보고회 3일 전까지 발주기관과 사전협의를 거친 후 보고회를 개최한다.

5) 수시회의

- 발주기관이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 설계자의 설계진행 시 문제점이 발생하거나 발주기관이 설계에 대하여 의문 사항이 있을 경우, 설계자는 보고에 필요한 자료를 작성․제출하여 발주기관과 관련 내용을 협의하여야 한다.

6) 기타 회의

- 발주기관 필요에 따라 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 설계자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성․제출하여야 한다.

- 회의 진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

7) 회의 준비, 자료 제출 등

- 설계자는 원활한 회의가 진행될 수 있도록 발표자료를 준비하여 회의 시작 전 배포하여야 한다.

- 보고서 제출 시기는 단계별 설계 완료 이전으로 하고, 부수는‘제5장 설계도서 납품목록’에 따른다.

8) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

Ⅲ

기술지침

1. 설계 기본방향

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특이사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 설계자가 보다 발전적인 계획이 있을 경우 임의로 판단하지 않고 발주기관과 협의하여 과업을 진행한다.

1) 효율적인 공간 활용을 통해 문화예술에 특화된 전문적인 교육과 실습이 이루어질 수 있는 공간으로 설계한다.

2) ‘문화예술교육 전문 연수원’의 이용 계획을 고려하여 창의적이고 실용적인 공간으로 구성한다.

3) 유사 시설 및 사례, 현장 특수성을 충분히 검토하여 차별화된 설계를 하여야 한다.

4) 계획 및 중간 설계단계에서 건축 구상은 발주기관과 충분한 협의를 하여야 한다.

나. 건축, 기계설비, 소방, 전기, 통신공사 등에 대한 설계는 관련 법령에 의한 제반 규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따르도록 한다.

1) 공종별 연계되는 사항, 기존 시설 및 설비와 관련한 각종 사항들을 면밀히 조사, 검토하여 시공과 향후 운영, 기능 유지가 원활하도록 설계한다.

2) 당해 설계로 인하여 기존 건축물에 영향을 미치거나, 일부 시설만 교체·정비하여 미관 저해, 사용의 불편이 초래하지 않도록 계획한다.

3) 구)충남도청사 후생관 건물을 리모델링하여‘문화예술교육 전문 연수원’을 조성하는 사업으로, 설계 품질을 확보하기 위해 계획 시 건축, 구조(안전성), 전기 및 통신, 기계설비 및 소방, 철거, 인테리어(가구계획, 색채계획, 조명계획, 사인디자인) 등을 통합적으로 고려하여 설계한다.

다.	건축물은 유지관리 및 에너지 절약이 용이하도록 경제적으로 계획되어야 하며, 기존 설비 및 상수도, 오□배수, 소방 등에 대한 연계 활용을 검토하여 공사비 절감 및 유지관리의 효율화를 마련한다.

라. 기존 시설물(구조, 설비시설 등)에 대한 각종 사항을 조사(실사) 및 검토하여 철거 및 재활용, 이전 등 계획을 수립하고, 이에 따른 비용을 계상하여야 한다.

마. ‘장애인, 노인, 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률’제8조에 따라 무장애 시설 구현 및 편의시설을 설치기준에 적합하게 계획한다.

바. 안전성과 시공성을 확보한 리모델링 설계를 하여야 한다.

① 기존 건축물을 리모델링하는 점을 감안하여 철거 및 개선 시 구조적 영향이 없도록 구조설계에 따라 구조보강에 대한 대안을 제시하여야 한다.

② 기능과 내진설계, 진동하중 등에 대한 검토를 적용한 안전한 구조설계를 계획한다.

③ 설계자는 설계과정 중 도출한 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.

④ 철거공사, 가설공사 등의 시행 시, 기후조건에 대해 적절하게 설계에 반영되어야 한다. 철거 시 안전 확보대책이 포함된 계획서의 제출, 사용 장비·순서 등에 대한 구체적인 건축물 해체계획서 마련, 건축물 해체의 신고 및 허가, 내진보강설계 등이 필요한 경우에는 적법한 절차에 따른 업무를 수행한다.

⑤ 대지주변 및 건축물 내 소음원이 있는 경우, 소음에 대한 대책을 수립하여 설계한다.

⑥ 기존 시설을 유지(건물내 대전평생교육진흥원 등)하고 공사를 진행해야 하므로 직원 및 이용자들의 불편이 발생하지 않도록 철저한 공사 진행 및 관리 계획을 수립하여 시설 사용자의 쾌적한 이용환경을 확보한다. 분진, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려하여 설계한다. 특히, 환경부‘비산먼지 관리 매뉴얼’을 참고하여 구체적인 저감 방안을 마련하도록 한다.

사. 색채 및 사인 계획은 유니버셜 디자인을 고려하여 비상시 직관적인 판단이 가능하도록 하고, 건축 마감 및 가구 디테일은 누구나 이용이 편리하도록 계획한다.

아. 기타 발주기관 및 문화체육관광부의 요구사항을 반영한다.

2. 관급자재 및 주요 자재의 선정

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제83조 및 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정고시한 품목의 공사용 자재 등을 직접 구매토록 규정하고 있으므로, 설계자는 발주기관과 협의하여 조달청 시설공사 맞춤형 서비스 관급자재 선정기준에 따라 관급자재를 선정하여야 한다.

나. 설계자는 조달청 관급자재 선정 운영기준에 따라 해당되는 자재 리스트 및 관급자재선정 검토서를 적기에 작성․제출하여야 한다. 또한 관급자재 및 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계 및 내역에 반영하여야 한다.

3. 배치계획

가. 배치의 기본조건

1) 문화예술교육 장르별 특성을 살린 예술적 표현방식 구현과 체험이 가능한 공간 컨셉을 제안한다.

2) 프로그램은 개별적 특성과 상관관계 및 층간 연계를 고려하여 리모델링 대상 6,7층에 자유롭게 배치한다.

3) 프로그램을 단순한 기능배치에 한정하지 않고 유연하게 활용할 수 있는 아이디어와 향후 프로그램 및 기능 변화에 대응하는 입체적이고 개방적인 공간 계획을 제안한다.

4) 기존 건축물은 보존을 원칙으로 하되 아래를 고려하여 창의적으로 계획한다.

※ 높이 변화에 따른 수직증축(법적내용)은 가능하며, 예정공사비내에서 자유롭게 제안할 수 있다.

① 프로그램의 목적에 따라 대공간의 높이를 요구하는 프로그램을 위해서 부분적으로 구조를 고려하여 변형할 수 있다.

5) 공모 제안 시에는 리모델링에 따른 구조안전성을 확보할 수 있도록 구조기술사의 구조안전확인을 실행한다.

6) 건축물의 냉□난방 및 단열계획은 교육연구시설임을 고려하여 공사비 내에서 현행법의 건축물의 용도에 맞게 계획한다.

7) 이용자의 편의성을 고려하여 장애물 없는 유니버셜 디자인을 적용한다.

나. 동선계획

1) 이용자의 보행 동선은 1층 출입구 및 엘비베이터, 계단 등 대전평생진흥원과의 공동 활용현황을 고려하여 이용자가 쉽게 접근하고 효율적으로 이동할 수 있는 동선체계가 될 수 있도록 계획한다.

2) 이용자의 편의성을 고려하여 장애물 없는 유니버셜 디자인을 적용하고, 장애인 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립 반영하여야 한다.

3) 교육연구시설로서 피난활동 시 안전하고 빠른 대처가 가능하도록 피난 동선 등을 계획하며 신속하고 효율적인 외부 진입이 가능하도록 계획한다.

4. 건축계획

가. 기본방향

1) 기존 건축물의 구조안전성의 확인과 리모델링으로 인한 건축구조 안전성 여부를 검토하여 반영한다.

2) 예산 대비 효율적, 경제적인 방법으로 건물 내·외부의 환경개선이 되도록 한다.

3) 층별(총 2개층) 기능 확보, 층간 연계가 최적이 될 수 있도록 계획을 수립한다.

4) 설계자의 공간활용계획을 근간으로, 발주기관이 계획한 기능의 유지가 가능한지를 협의하여 계획한다.

5) 제안된 계획에 따른 기존 건축물 해체는 본 용역에 포함하여 추진한다. 설계안에 따라 내진성능확보, 해체 허가 및 심의가 필요한 경우, 관련 업무(내진보강설계, 해체 계획서 및 해제 인허가)를 포함한다.

6) 내부에 설치되는 인테리어 가구(제작설치), 조명, 음향시스템 등은 계획에 반영, 배치되어야 하며 평면도 내에 표기가 어려울 때에는 별도의 기구 및 장비의 배치계획도를 작성하여야 한다. 이용에 지장이 없도록 설계 설명서에 사양을 표기한다.

7) 가급적 최대 유효높이를 확보하여 개방적인 공간 연출을 지향하나, 예정공사비 내에서 건축물 높이 증축이 가능하다면 제안은 가능하다. 단, 이에 따른 구조의 안전, 내진보강설계, 해체설계, 설계안전성 검토 등을 포함하여 설계에 반영하여야 한다.

8) 변경되는 냉·난방 공조 기능 등을 위해 변형된 창호 계획 등은 선행이 되어야 하며, 단열성에 문제가 있는 기존 창호의 경우 복층유리, 이중창 설치 등이 고려되어야 한다. 다만 공사비등을 고려하여 기존 건물의 외부 입면 조화를 위해 규격, 색상 등은 발주기관과 협의하여 결정한다.

9) 각 동에 부착·설치되는 시설물, 마감재 등은 시설 이용자의 사용에 무리가 없는 재질로 선정한다.

나. 프로그램별 공간계획

- 문화예술교육 전문 연수원은 총 2개층을 리모델링하여 조성한다. 2개층의 구성은 아래 유형과 같이 조성하며 세부내용은 설계공모 지침서를 참고한다.

① 다목적홀

② 공연예술 연습실

③ 시각예술 실습실

④ 디지털 교육 실습실

⑤ 교육지원 공간

⑥ 기타공간

5. 구조

가. 일반사항

1) 리모델링과 관련한 구조설계는 경제성, 안전성 및 시공성을 고려하여 합리적인 계획이 되도록 하며, 구조물의 환경 및 사용조건의 변화에 대하여 구조물의 안전이 보장될 수 있도록 한다. 관련 법의 규정치 이상의 처짐, 진동 현상 등이 발생하여서는 안 된다.

2) 철거 등 발생 시 건물의 안전상태, 시공계획 등을 고려하여 안전한 구조로 설계하여야 한다.

3) 구조물의 사용성, 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 하중 검토가 수행되어야 하며, 적절한 보수·보강 대책을 제시하여야 한다. 이때 사용하는 공법은 안전성이 검증된 방법이어야 한다.

4) 구조계산은 객관성이 있는 국내외 관계 규준을 적용하여야 한다.

5) 구조 안전은 관계법에 따라 전문가(건축구조기술사)의 확인을 받고, 작성한 도서에 기명·날인 하여야 한다. 사용하는 건축 재료의 품질은 관계법에 의거 공인된 것이어야 한다.

6) 구조안전성 검토, 구조안전진단 수행 및 내진설계 결과 등을 참고, 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 한다.

7) 구조 보강 시 경제적이며 시공 상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 특수구조이거나 시공 상에 특수공법이 필요한 경우에는 반드시 선정 사유를 발주기관이 객관적으로 인정할 수 있어야 한다.

8) 리모델링 시 내부 기둥과 구조를 고려한 계획이 필요하다. 가급적 기존 건축물의 주요구조부를 해체하지 않는 방안의 리모델링 제안을 요청하나, 주요구조부를 변경할 경우에는 내진보강설계까지 업무에 포함한다.

6. 기계설비

가. 일반 사항

1) 설계조건은 기존 건축물의 조건을 고려하고, 건축, 전기 등 타 공종 기타 조건에 적합하게 설계하며, 타공종과의 업무 범위 구분을 명확하게 기재하여 도면 및 보고서에 표기한다.

2) 층고 확보를 위한 방안으로 옥상의 구조를 변경할 시, 현재 옥상에 존치하는 구조물과 설비에 대한 조사와 이동 위치 등을 고려하여 계획한다. (현재, 옥상에 실외기 등이 다수 설치되어 있어 현장 조사 등을 수행하여 합리적인 이설계획을 포함한 계획 등)

2) 설계기자재의 설치는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙의 준수와 조달청 시설 자재단가 우선적용을 검토하며, 설계도서, 공사시방서 등은 국토교통부 제정 건축 기계설비공사 표준시방서와 기타 전문시방서 등에 의거 적법하게 작성한다.

3) H.V.A.C. 설비, 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 경제적 효율과 기능이 우수한 것으로 선정한다. 주요 장비는 설계 전 반드시 발주기관과 상의하여 설계를 진행하여야 한다.

4) 대지의 외적 환경조건을 분석하여 동별 최적의 내부 환경을 갖출 수 있도록 종합적으로 계획한다.

5) 공조 부하에 대한 전반적인 기술검토 결과를 반영하여야 하며, 내부 실의 구획 및 리모델링에 따른 내부 공간 변경을 수반하는 경우 냉난방 부하 등에 대하여 기술적 검토와 협의를 거쳐 설계한다.

6) 사용자를 고려하여 필요시 바닥난방도 고려하여야 한다.

7. 전기 및 정보통신

가. 일반 사항

1) 전기설계는 안정성, 신뢰성, 경제성 및 정확성을 기함으로써 효율적이고 양질의 설계가 되도록 한다. 또한 장기적 수요를 감안하여 장기적 측면에서 충분한 용량을 확보하여야 한다.

2) 영상, 음향 및 정보통신 설비의 시공 관련 향후 운용과 확장이 용이하여야 하며 초고속 정보통신망의 접속은 원활하여야 한다.

3) 영상, 음향 및 정보통신 설비의 각종 장비 및 주변기기 등을 설계에 포함한다.

4) 각종 이전비, 이설비, 기존시설물의 철거비를 공사비에 반영하여야 한다.

5) 설계도서 및 공사시방서는 전문시방서(건축전기)에 의거 작성하여야 하며, 시공 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기하여야 한다. 각종 자재의 단가는 조달청 시설자재 단가를 최우선 적용한다.

6) 설계도에는 관련 분야(건축, 설비 등)의 단면도 및 설비도 등을 포함하여야 하며, 시스템 계통도 및 기기 수량, 용량, 특성 등을 도표로 작성하여 표기한다.

7) 통합배선(전화, TV, LAN) 관련분야는 정보통신공사업법의 규정을 적용, 기존 인입 등을 고려하여 설계하며, 사용자 및 운영자의 편리성을 도모한다.

나. 설계기준

1) 수전설비

- 변전설비 교체(전등, 전열, 비상용 전원)

2) 간선설비

① 간선설비는 전기실로부터 각 관련실까지 단독회로로 구성하여야 하며, 장래 증설 부하(예비부하)를 감안하여 충분한 선로를 계획하고, 리모델링 설계임을 감안, 기존 전기실의 배선용차단기 및 기타 설비의 보수가 필요할 경우 공사 범위를 협의 확정 후 공사비에 반영하여야 한다.

② 각 동별 분전반을 설치하는 것을 우선적으로 검토하고, 실내인테리어 구성상 기존 분전반을 이설할 경우 현장 시공성을 감안하여 계획하여야 한다.

③ 케이블 트레이를 설치할 경우 트레이의 크기는 간선배열 및 추후 증설을 고려하여 현장 여건을 확인하고 충분한 크기를 갖도록 구성한다.

④ 전기기기 선정 시 단락전류를 고려하여야 하며, 관련 계산서 및 근거자료를 제출하고 도면에 명기하여야 한다.

⑤ 분전반에 사용하는 개폐기의 수량은 여유율 20% 이상 두어야 하며, 비상회로 및 지락보호장치가 설치된 회로 또는 규정상 누전차단기 설치가 제외된 회로 이외의 모든 분기회로의 차단기는 누전차단기로 설치한다.

⑥ 분전반의 전등·전열용 분기회로에는 ELB를 사용하고 접지선을 포설하여야 하며, 분전반 예비 MCCB 수량의 예비배관을 설계하여 상단에 Box로 마무리 하여야 한다.

⑦ 트레이 및 덕트 배선방식일 경우 무독성 난연 케이블을 사용한다.

⑧ 각종 배관에 접지본딩 시공 방법 및 상세도를 명기하고 공사비에 반영하여야 한다.

3) 조명 및 전열설비

- 조명등기구

① 조명기구는 에너지절약 합리화에 기인하여 LED등기구로 설계한다.

② 조명기구는 한국에너지공단의 고효율에너지기자재 인증표시제품 및 한전의 “고”마크 제품을 우선 설계하여야 하며, 기타 등기구는 실내인테리어와 조화를 이룰 수 있는 기구를 선정한다.

③ 조명기구는 LAMP 1개당 안정기 1개를 설치한다.

④ 각종 전등회로에는 접지선을 설치하여야 한다.

⑤ 재사용이 필요할 경우 공사범위를 협의 확정 후 공사비에 반영하여야 한다.

⑥ 각 용도에 적합한 조명의 기능이 충족되도록, 공연을 위한 조명설계, 전시를 위한 조명설계를 적정 공간에 반영한다.

- 전열설비

① 전열용 콘센트는 1회로에 콘센트는 6개 이하 또는 12A 이하로 구성하며, 전기방열기등 2kW이상의 전열기기 콘센트는 단독회로로 구성하여야 하며, 12A를 초과하는 단독회로는 차단기를 내장한 접속단자함을 설치한다.

② 전열용 콘센트의 배선은 접지선을 연결하여야 한다.

③ 옥내 기타 전열설비를 설치하는데 지장이 없도록 계획한다.

④ 재사용이 필요할 경우 공사범위를 협의 확정 후 공사비에 반영하여야 한다.

⑤ 필요시 천장레일 등 창작 작업에 유연하게 대응할 수 있는 설계를 고려한다.

4) 전화설비

① 장래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

② 교환기의 형식 및 전화수구 수량이 적정하여야 한다.

③ 교환대의 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

5) LAN설비

- 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

6) 약전설비공사

- 방송설비, A/V 설비, MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

7) 장애인 편의시설 설치공사

- 비상통화장치 등 장애인 편의시설을 설치기준을 준용을 검토하여 가급적 설계에 반영한다.

다. 주요 자재 선정 기준

1) 케이블의 재료, 구조, 가공 방법, 특성 및 시험 등 제반 사항은 한국산업표준규격(KS)에 적합하여야 하며, 트레이 또는 덕트 내에 설치하는 케이블은 무독성 난연케이블을 사용하고 케이블의 중간접속은 허용치 않는다.

2) 각종 표시 램프는 LED 타입을 사용하여야 한다.

라. 각종 계산서 제출

1) 조도 계산서, 간선 및 부하계산서, 전압강하계산서, 단락전류계산서 등 기타 발주기관에서 요구하는 각종 계산 자료를 제출하여야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야한다.

8. 소  방

가. 기존 설비 및 소방 등에 대한 연계활용을 검토하여 공사비 절감 및 유지관리의 효율화를 마련하고, 높이증축 해당 시, 스프링클러의 설비 등은 예정 공사비 내에서 관계 법령에 부합하도록 계획한다.

나. 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물안전관리법 등에 부합하도록 설계하여야 한다.

다. 다수인이 출입하는 곳이므로 오동작이나 오조작이 없도록 안정적인 설비로 한다.

라. 사용자가 이용하는 시설에 적용되는 소화매체는 2차적 손상을 방지하고 인명피해를 최소화하는 등, 안정성과 초기투자비용을 고려하여 선정하여야 한다.

마. 수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등은 소방법에 적합한 설계를 하여야 한다.

바. 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여야 한다.

Ⅳ

설계도서 작성 요령

1. 설계도서의 분리작성

건축, 구조, 기계설비, 소방, 전기, 통신, 폐기물처리, 전시 및 방송장비 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출서 등) 단, 발주단위에 대해서는 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

※ 전기, 소방, 통신, 건축폐기물처리 등 도서는 관련법에 따라 분리발주가 가능토록 작성해야 한다.

2. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 용역계약일반조건 제5조(사용언어)에 의한다.

나. 약어를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1~2회 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면: A

2) 건축구조도면: S

3) 기계설비도면: M

4) 전기도면: E

5) 정보통신도면: ET

6) 소방(설비, 전기) : MF / EF

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 정보통신 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

3. 도면작성

가. 도면 재질은 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

라. 건축, 기계, 전기, 정보통신 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping)에 의한 교차 검토(Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 완료보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

바. 설계도면 작성시에는 다음의 4,5,6항과 국토부 고시 제2020-635호(2020.9.14) 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제6조를 준용한다.

사. 본 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 사전에 발주기관과 협의하여 수행하여야 한다.

아. 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2020-635호, 2020. 9. 14.)」의 「[별표 2] 건축설계에서의 도서작성」에서 명시한 계획․중간․실시설계의 도서작성의 내용은 「중급」에 준하여 작성, 과업내용서 「설계도서 작성 요령」에 명시된 사항을 작성함을 원칙으로 하되, 추가하거나 삭제할 사항은 발주기관과 협의하여 최종 결정한다.

4. 기타 성과품의 작성

가. 설계설명서

1) 공통분야

- 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

2) 건축분야

- 기본계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 부대시설 등 기본방식 결정, 친환경설계 내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 동선계획, 인테리어계획(가구, 색채, 조명, 사인, 방송장비 구축 등)

3) 기계설비분야

- 주요설비, 냉․온열원, 환기, 소화, 공조덕트, 위생 등 기타설비, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부시공 및 공정계획, 세부 공사비 등

4) 전기분야

- 전등전열, 소화설비(자동화재탐지), 옥외외등설비, 전력간선, 전기, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부 공정계획 및 공사비 등

5) 통신분야

- 구내통신, 통합배선, 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 공사비 등

6) 소방설비

- 설계설명서, 설비도, 계통도, 도면, 세부 공정계획 및 공사비 등

나. 각종 계산서

구조계산서 전력하부 계산서, 조도 계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비용량계산서, 에너지절약계산서, 정화조 등 용량계산서를 포함하되 세부사항은 다음과 같다.

1) 구조계산서

① 구조계산서는 필요시 작성하고 작성 시에는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 하며, 특히 프로그램의 입·출력 자료는 모든 CASE 별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

② 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주기관과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

③ 구조계산서의 각 페이지 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어 계산의 적정 여부를 확인 후 서명토록 한다.

④ 구조계산 시 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시한다.

2) 설비분야 설계계산서

- 주요 장비 및 설비의 용량계산서 및 선정서, 부하계산서

3) 전기·통신분야 설계계산서

단락전류·변압기용량·비상발전기용량·배터리 및 충전기용량·전압강화·전화회선산정·방송용 앰프용량 등의 계산서, 부하계산서, 조도계산서, 화재수신반, 회로계산서 등

다. 설계도면

1) 일반사항

① 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

② 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용)과 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

③ 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

④ 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정 여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

⑤ 설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

⑥ 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련있는 도면의 번호 및 도면명을 표기한다.

⑦ 모든 도면은 CAD 프로그램을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB에 담아 제출한다.

2) 반영사항

① 실내·외 기본구상 및 개념도

(동선계획, 가구 등 실배치계획, 마감재선정 기본구상)

② 실내·외재료 마감표(외부공간 및 각 실별, 바닥, 벽, 천장 위치별 마감자재 종류, 규격, 색상, 주요 특징 명기)

③ 평면도 : 실별 평면도(축척임의) - 주 사용재료 표기

④ 시설 및 가구 배치 평면도(평면표기 불가 시) - 축척임의

⑤ 내부입면도 : 주요 실별 각 부분 입면도 (축척임의) - 주 사용재료 표기

⑥ 단면도 : 각 부분의 주요변경 위치(축척임의)

⑦ 실내천정도 : 각 실별 (축척임의)

⑧ 실내·외 투시도 및 조감도 : 주요실 및 주요 외부공간

⑨ 각종상세도

⑩ 기타 분야별 관계도면

라. 공사시방서

1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로 국토교통부 제정 표준시방서, 건축공사 전문시방서 및 관련법규 등을 근간으로 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 건축공사 전문시방서에 없는 공종은 추가하여 보완하여야 한다.

3) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

① 적용 범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토 의무 등에 관한 세부 사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련 법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

⑤ 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

⑥ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부 사항

⑦ 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

⑨ 공사, 공정, 품질, 안전, 환경관리 등에 대한 상세사항

⑩ 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

⑪ 공사 전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 기타 주요공사 사항

4) 공사시방서 작성 시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성 형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 공사 기성에 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑧ 발주기관의 의도를 정확히 파악하고 발주기관의 감독관, 계약대상자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 정확한 문법을 준수하고, 오탈자, 오기 등이 없도록 작성한다.

마. 공사 내역서

1) 공사 내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 참조하여 발주기관과 협의하여 적용하여야 한다.

2) 공사비 내역서는 기획재정부 「(계약예규) 예정가격작성기준」 및 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준을 적용한다.

가) 재료비

① 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재 가격)으로 한다.

② 조달정보지에 미수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용한다.

③ 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해물품의 거래가격을 현장 조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

나) 직접노무비: 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

3) 공사비는 예정공사비를 기준으로 하며 부득이한 경우 발주기관과 협의하여 변경할 수 있다.

4) 공사비에는 지장물 이설비, 한전 인입비, 상수도 인입비, 시운전비(전기,기계) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

5) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록한다.

6) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를 인용할 수 있으나, 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

7) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

8) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련기준 및 외국사례를 참조 작성하여야 한다.

9) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

10) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부산출내역을 첨부해야 한다.

바. 기타

1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

3) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. (다만, 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 등 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.)

Ⅴ

설계도서 납품목록

1. 최종 성과품 종류 및 납품부수 ※ 협의에 따라 변경될 수 있음

단계	설계도서명	수량	규격	비고
계획설계	제출문	-	-	- 보고서 표지 - 설계용역 보고서 책임/참여기술자 명단
	계획설계보고서 (설계설명서)	3부	A3	‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준’ [별표 2] 건축설계에서의 도서작성 계획설계 도서 내용
	각종설계기준자료	3부	A4	- 설계지침반영 체크리스트 - 설계요구조건 반영사항 체크리스트 - 법 기준 설계 적용 계획서 - 관련 법규 검토서 - 기타 과업 사항
중간설계	제출문	-	-	- 보고서 표지 - 설계용역 보고서 책임/참여기술자 명단
	중간설계보고서 (설계설명서)	3부	A4	‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준’ [별표 2] 건축설계에서의 도서작성 중간설계 도서내용
	설계도면	3부	A3	- 백도, 반접이, 공종별 분리
	개략 공사비	3부	A4	- 공종별 개략 공사비 내역
	각종 계산서	3부	A4
	조감도 또는 투시도	2부	A2	- CG파일 원본
실시설계	제출문	-	-	- 보고서 표지 - 설계용역 보고서 책임/참여기술자 명단
	종결보고서	5부	A4	- 1부로 작성
	실시설계보고서 (설계설명서)	5부	A4	“공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준” [별표 2] 건축설계에서의 도서작성 실시설계 도서내용
	설계도면	5부	A3
	각종 계산서	5부	A4	- 구조계산서, 부하계산서 등
	내역서	5부	A4	- 관급내역서 포함
	수량 산출서	5부	A4
	단가 산출서	5부	A4	- 견적서 포함
	일위 대가표	5부	A4
	일반 시방서	5부	A4
	특기 시방서	5부	A4
	관급 시방서	5부	A4
	기타 검토서	5부	A4	- 에너지 절약계획서 검토 관련 증빙서류 – 설계안전성 검토 보고서 등
	사전승인대상 결과물	5부	A4	- 신기술, 신공법 검토보고서 - 특정 제품, 외국산 자재 적용계획서 및 자문승인 결과물 - 색채, 재료 견본 - 특수분야 계획 - 인테리어 설계 - 실내외 색채계획 - 기타 과업 사항
	조감도	3부	A1	- 표구 포함 (0.6m*0.9m이상)
	공사예정공정표	1부	A3	- 전공종 포함
	공사기간산정검토서	2부	A4
	USB	3EA		- 공종별 통합 CAD 및 PDF 변환 자료 (계획설계, 중간설계, 실시설계, 회의록, 각종 심의/인허가자료, 발표자료 등 포함)
인허가 도서	건축심의, 허가, 착공도서 등	3부	A4	- 허가 도서 규격 준용
기타 발주기관 요구사항	공사별 현장설명서	-	A4	- 발주자 요구 부수 - 기타 발주자가 요구하는 성과품 등
비 고	- 설계도면(도면목록파일 및 폰트 포함)과 시방서는 종합하여 파일 제출 - 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함)는 원본 및 EXCEL 파일로 제출하고, 사용프로그램 및 내역서 작성 요령, 공종분야별 구분 등에 대하여는 발주기관과 수시 협의한다.

주) ① 납품도서에 포함되는 도서의 내용은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」별표2 건축설계에서의 도서작성을 기준으로 한다.(중급)

② 설계공모 심사위원의 지적사항/ 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영) 결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 USB 등 디지털자료로 제작하여 제출

③ 발주기관과 설계자의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

④ 내역서는 반드시 조달청 공사원가계산 호환프로그램으로 작성한다.(관급포함)

⑤ 관급자재 내역은 견적서가 아닌 일위대가표 작성 후 내역서 작성한다.

⑥ 분리발주가 필요한 공종(폐기물처리 등)은 별도 작성 후 제출

⑦ 설계도서는 컴퓨터 프로그램(CAD, ᄒᆞᆫ글 등)으로 작성하고 확인 및 실행이 가능하도록 각 원본파일 및 PDF로 변환한 파일을 USB에 저장하여 제출

2. 설계도서 작성 시 유의사항

1) 도면, 시방서(일반시방서, 특기시방서) 및 내역서 즉, 설계도서 상호간 자재, 규격, 공법 등을 필히 일치할 것

2) 내역서의 품명 또는 규격 란에 재료명, 시공방법 등 명확히 표기

(예 : 액체방수 1종, 조합페인트 1급 2회, 일반유리, 복층유리, 강화유리, 가설전력 사용량(㎾) 등)

※ 불가피하게 수량을 1식 표기시 특기 시방서상 준공 시 정산조건을 명시

3) 중기 경비산출 단가산출서 첨부 및 내역서의 품명 또는 규격란에 중기종류, 공법(90% 백호우0.7+10%인력 등), 조건(운반거리 명기) 등을 명확히 표기

4) 목공사, 금속공사, 내장공사 등의 모든 품목은 일위대가표 작성이 원칙

5) 내역서 작성시 전문업체 견적가격을 적용시 해당견적서 첨부(3개 이상 복수견적)

6) 내역서는 물품 목록코드에 의한 시설공사 자재코드 및 일위대가코드(조달청 파일 호환 규정을 통과한 내역 프로그램, EMS 등)로 작성하고 새로운 자재 및 일위대가는 기존 일위대가를 변경하여 작성하지 말고 신규코드로 작성

※ 기존 일위대가를 변형 또는 변경하여 적용시 오류 발생이 많음

※ 조달청 적용 자재 및 일위대가 코드 자릿수 반영

7) 창호공사는 Type별 개소당 내역서 및 일위대가표로 작성하고 일위대가 세부 내역은 다음과 같이 산출

① Al.창호 : Fix, SL, PJ, 커튼월 등으로 구분하여 창호철물 및 부자재    제외된 순(純) 알미늄바 만의 정미중량(kg)으로 산출하여 내역서의 규 격란에 명기하고 마감을 명시할 것(예 : 불소2회)

② 커튼월 창호는 커튼월을 명시해주고 단열바 창호는 단열바를 M으로산출하여 단가 적용할 것

③ 철재도어 및 샷다 : 프레임 규격, 마감 등을 표기 후 면적(㎡) 단가적용(예 : 150×45×1.6ⓣ, 분체도장, 1.89㎡)

④ 스텐레스 창호 : 부재의 규격, 마감별로 구분하여 길이(m) 단가 적용(예 : 100×40×1.2ⓣ, 헤어라인마감, 5.2m)

※ 창호철물(정첩, 도어록, 프로어힌지 등)과 코킹은 별도내역으로 작성

8) 사후 정산공종(P.S.)이 있을 경우에는 특기시방서에 품명, 범위, 수량, 해당금액 및 정산 방법 등을 표기

9) 관급자재는 도급자 설치 관급액과 관급자 설치 관급액으로 구분 표기(산업안전보건관리비 산정 시 도급자 설치 관급액만 반영)

10) 폐기물은 품명, 규격란에 폐기물 종류(내장재, 구조물 철거재, 혼합폐기물) 및 처리방법(매립 또는 재활용처리)을 표기하고, 100톤이상 시는 별도 발주 내역작성

11) 원가 계산 시 환경보전비, 건설하도급 대금지급 보증서 발급수수료, 국민건강 보험료, 국민연금 보험료 추가 계상

12) 조달청 시장시공가격을 우선 적용하여 내역서를 작성할 것

13) 조달청 원가계산 제비율을 참고하여 원가계산 할 것

14) 특정자재사용은 가급적 지양할 것

15) 주요자재(시멘트, 모래, 자갈, 잡석)는 별도공종으로 취합 반영함

16) 원가계산은 아래와 같이 할 것(공사발주별)

① 건축(건축+기계설비)은 건축 원가제비율 적용

② 전기는 전기 원가제비율 적용

③ 통신은 통신 원가제비율 적용

④ 소방은 소방 원가제비율 적용

⑤ 기타(폐기물처리비)등은 기타 원가계산 제비율 적용

⑥ 고철은 높은 단가를 적용하여 공사비에서 감액, 다만 기존 시설물의 철거, 해체 등으로 발생하는 작업 부산물의 경우에는 재료비에서 공제하지 아니하고 별도 계상

17) 공사비 총괄표를 작성할 것

18) 모든 공사는 위 “1~17”항까지의 내용을 준용하여 작성한다.

19) 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행 과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 요청사항 및 조치 결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

20) 공사예정공정표는 공정계획을 수립하여 공사 기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 각 공종별로 단일화 시켜야 하며, 이 공종들의 상관관계를 경로와 날짜가 나타나도록 공정표를 작성한다.(공정을 월별, 누계치를 표시) 특수공정은 작업의 시작과 종료 시점에서 선행되어야 하는 작업명칭을 기입하여야 한다. 총 공정 일정은 실제 공사시행에 적용할 수 있는 자연적, 지리적, 인위적 요소가 감안된 일정이어야 하며, 휴일은 일정에 산입한다. 공사공정표는 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부 고시 제2021- 1080호, 2021.9.8.)에 의해 산출된 공사기간의 내용을 반영하여 작성한다. 공사기간 중 시설의 부분적인 활용과 소장품과 가구 등의 관리를 고려하여 공정표를 작성한다.

Ⅵ

관련서식

1. 보안각서

2. 책임기술자 선임계

3. 하도급 승인요청서

4. 설계 검사원 (계획, 중간, 실시)

5. 주간 공정보고

6. 월간 공정보고

(서식 1) 보안각서

보 안 각 서

1. 용 역 명 :

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 완수예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 중요시설임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 취득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 계약목적물에 대한 지식재산권 등에 대한 귀속은 용역계약일반조건 및 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제12조 (계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따른다.

2025년   월   일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 :

성        명 :               (인)

한국문화예술교육진흥원 귀하

(서식 2) 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 : 원

3. 계약일자 : 2025.   .   .

4. 착수일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

- 아          래 -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2025년   월   일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :               (인)

한국문화예술교육진흥원 귀하

(서식 3) 하도급 승인요청서

하 도 급  승 인 요 청 서

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2025.   .   .

4. 착수일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

- 아     래 -

가. 하도급 분야 :

나. 하도급 금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 사본 1부.

2. 하도급계약서 사본 1부.

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부.

상기인에게 ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오며 용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2025년   월   일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :               (인)

한국문화예술교육진흥원 귀하

(서식 4) 설계 검사원(계획, 중간, 실시)

설계 검사원 (계획, 중간, 실시)

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2025.   .   .

4. 착수일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

붙임 : 납품설계도서 목록 1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2025년   월   일

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :               (인)

한국문화예술교육진흥원 귀하

(서식 5) 주간 공정보고

주간 공정보고

1) 용 역 명 :

2) 용역개요

□ 현장위치 :

□ 용역기간 : 202 년   월   일 ~ 202 년   월   일

□ 계약금액 : ○○○원

3) 용역진행사항

구분	전주 진행사항(202 . . .)	금주 예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 기계, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정 (%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :               (인)

한국문화예술교육진흥원 귀하

(서식 6) 월간 공정보고

월간 공정 보고

1) 용 역 명 :

2) 용역개요

□ 현장위치 :

□ 용역기간 : 202 년   월   일 ~ 202 년   월   일

□ 계약금액 : ○○○원

3) 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용(202 . . . ~ 202 . . .)	비고(진행률)
첫째주		실시/예정공정(%)
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익 월	공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :                (인)

한국문화예술교육진흥원 귀하