충청수영 선소공원 조성사업

실시설계 과업내용서

2025.  05.

-  목         차  -

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업명	3

2. 과업의 목적	3

3. 과업의 범위	3

4. 과업기간	4

5. 과업의 내용	4

Ⅱ. 과업의 추진

1. 과업의 수행 조건	5

2. 현황 및 여건분석	5

3. 계획 및 중간설계, 실시설계 수행	5

4. 보안사항	6

5. 용역계약의 해지 등	6

6. 결과물의 저작권	7

7. 과업수행 보고	7

8. 기타 유의사항	7

9. 성과품 제출	7

Ⅲ. 과업수행 일반지침

1. 총칙	9

2. 조사 및 자료수집	16

3. 분야별 고려사항	19

4. 실시설계	22

【부록】

〔붙임 1〕 보안각서	33

〔붙임 2〕 책임기술자선임계	34

〔붙임 3〕 설계 검사원	35

〔붙임 4〕 월간공정보고	36

Ⅰ	과업개요

1. 과 업 명 : 보령 충청수영 선소공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역

2. 목    적

본 과업은 ‘충청수영성’의 역사성 및 상징성을 기반해 충청수영 선소공원 조성 및 충청의 앞바다를 지켰던 판옥선을 복원하여 과거의 위상을 재현하고, 자유롭고 역사적인 공원 조성으로 시민 및 방문객의 체류시간 연장, 여가문화환경 개선을 통해 지역경제 활성화 기여를 도모함

3. 과업의 범위

○ 대지위치 : 충청남도 보령시 오천면 소성리 694번지 일원

○ 대지면적 : 지적상 면적(5,581㎡) / 공원조성 면적(4,150㎡)

※ 측량 시 공원조성 면적이 변경 될 수 있음

○ 예정공사비 : 2,447,853,000원(부가세포함)

☞ 제시된 예정공사비는 조경 ․ 건축(구조 포함) 토목 ․ 지반보강 ․ 기계설비 ․ 전기 ․ 통신 ․ 소방 ․ 신재생에너지 ․ 폐기물처리 (사업대상지 전기, 수도, 가스 등) 및 기타 부대경비 등에 대한 총 공사비이며, 공종 간 배분하여 제시된 예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

○ 예정설계비 : 189,310,000원(부가세포함)

○ 조경ㆍ건축 기본 및 실시설계 1식

○ 실시설계(조경ㆍ건축ㆍ국가유산ㆍ토목ㆍ전기ㆍ통신 등) 1식 및 측량, 각종 인증(BF)

- 시설물의 구조, 안전성, 이용성, 편리성, 마감재 및 미관 검토

- 시설별 위치의 적정성 및 기능, 규모 등의 검토 분석

○ 대상지 현황 및 현장조사

- 주변 여건(지하, 지상 지장물) 및 환경분석, 기존 현황 검토 등

- 입지 여건 분석 및 국내 유사 사업 등 사례조사 후 여건 및 현황 비교 분석

- 식재환경을 고려한 토양치환 등 고려

○ 각종 인허가ㆍ신고, 관계기관 및 국가유산 협의

- 관계기관 협의 및 승인(변경 포함)

- 국가유산청 문화유산 현상변경 허가 신청 및 협의, 심의·보고용 자료 등 제반사항

- 상기 과업 내용과 이에 따라 수반되는 기술 검토서 제출(경관심의, 보고용 자료 작성등 제반사항 포함)

○ 각종 보고회, 주민설명회, 기타 발주청이 정하는 사항

4. 과업기간 : 착수일로부터 120일(4개월)

5. 과업내용 : 공원조성 1식, 건축물 조성 1식

○ 충청수영의 주력함으로 운용되었던 ‘판옥선’과 연계된 역사적 가치와 관심을 조명할 수 있는 역사ㆍ문화 중심의 공원으로 조성

- 충청수영의 선소 문화 및 판옥선을 체험할 수 있는 공간, 특화된 공원시설 도입

- 역사ㆍ문화 중심의 차별화된 공원 조성으로 매력있는 도시 경쟁력 제고

- ‘판옥선’시설물은 별도 설치 예정이므로 공원조성 시 마스터플랜을 계획하여 추후 설치에 대해 원활히 진행될 수 있도록 계획

- 1단계(금회사업) : 선소공원(공원구성, 수공간, 판옥선 관람로, 산책길 등) 주차장계획,                   관리동 등

- 2단계(이후사업) : 판옥선(내부전시 포함)

○ 충청수군 및 판옥선 등 역사 스토리텔링을 활용해 기존 문화재인 ‘충청수영성’과 선소공원의 연계를 통해 관광객 참여 유도

○ 변화와 다채로움이 지속가능한 공원

- 지역 기반의 주민 참여형 공원 등 조성 방안 제시

- 지역주민이 다채롭게 이용할 수 있는 휴식ㆍ산책 공원

○ BF예비인증 및 본인증은 건물(관리동)에만 해당하며, 공원시설에는 적용하지 않는다. 다만, 대지 주출입구부터 건물 출입구까지 연결되는 외부공간(공원)에 대해서는 BF인증에 적합하도록 계획한다.

○ 조경 공사범위는 남측 1~2단 옹벽과 국가지정문화유산구역 경계선까지로 설정하며, 남측 기존 녹지대는 원형보존으로 공사범위에서 제외한다, 다만 부득이하게 현장여건 및 설계, 심의, 현상변경 등에 따라 공사 범위가 변경 될 시 발주처와 협의 후 진행한다.

Ⅱ	과업의 추진

1. 과업의 수행 조건

○ 본 과업을 수행하기 위하여 가장 최근에 수립된 유관계획 및 관련 계획을 분석

검토함으로써 과업추진이 원활하도록 한다.

○ 국가에서 공인된 방법 및 과학적인 근거에 따라 실시하여야 하며, 인용되는 자료는 정부기관,

기타 공공기관의 최근자료 등 공신력 있는 자료를 이용하고 근거를 명확히 제시하되,

그 출처를 표시하고 자료가 없을 경우 발주기관과 협의 결정한다.

○ 본 과업은 사후대책 수립 및 시행이 가능하도록 목표와 방향을 설정하여야 하며, 이해관계인

등이 적극적으로 참여할 수 있도록 방안을 강구하여야 한다.

2. 대상지역 현황 및 여건분석

○ 관련 계획, 사례 검토 반영

- 본 사업과 관련된 사업계획, 사례조사 등 검토하여 반영

- 대상지 중심으로 주요 거점별, 가로축별 현황 및 경관특성을 분석

- 유사사업의 시행여부 및 자료를 분석하여 예상되는 장애요인 사전 인지 및 우수사례 도입

○ 과업 종료시 까지 발주처가 요구하는 횟수에 따라 사업설명회 주관 및 활동사항 주민참여 지원

3. 기본 및 실시설계 수행

○ 관계인의 의견을 종합 수렴하여 그 내용의 적정성과 타당성을 분석, 사업기본 계획안

수정·보완을 통한 전체적인 마스터플랜 수립

○ 지역의 차별성과 정체성을 담은 계획을 수립하고 수요계층이 공감할 수 있도록 계획

○ 마스터플랜 내용을 반영하여 구역별, 시설물별, 부문별 구체적인 실행계획을 수립하고

실시설계도서 작성(계획 및 중간설계 단계 설계 수행)

○ 일반적인 설계방법, 기준 이외의 특정한 사항이 요구되는 경우에는 발주기관이 요구하는

설계방법, 기준 등에 따라서 기재한다.

○ 세부설계는 외국의 기준을 참고 할 수 있으나, 근거를 명시한다.

○ 설계도서는 시설물별 구분이 가능하도록 구체적이고 정확한 물량과 비용을 산출한다.

○ 지상 및 지하 지장물 조사 등 현장 여건을 면밀히 검토하여야 하며, 계획전에

시설물 관리기관 및 유관부서와의 충분한 협의후 결정한다.

○ 과업에 인용된 통계자료는 공공기관의 공식적인 자료를 활용하며, 인용된 통계 자료는

반드시 출처를 명시하여야 한다.

○ 자연친화적이고 깨끗한 이미지를 심어 줄 수 있도록 계획한다.

○ 특수한 자재를 사용하고자 하는 경우에는 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 사양서 및

기타 필요한 사항을 발주처에 제시한다.

○ 유관기관 협의 또는 심의가 필요한 경우 행정절차 이행에 필요한 서류를 작성 제출한다.

○ 시설 및 재료의 종류, 보수방법 요약 및 주요 점검방법 등 유지관리계획서를 작성한다.

○ 시방서는 계약문서의 일부분으로 품질, 기능, 재료, 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로 해당 표준 시방서 및 전문시방서 관련법류 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

○ 사업의 범위, 사업기간, 기타 필요한 시공조건 등을 설명하며 각종 기자재의 특성, 성격,

방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.

○ 도면에 표기하기 힘든 내용의 명칭, 주요자재의 종류, 설치기준, 제작설치 방법 등

특수한 사항은 시방서에 상세히 기입한다.

4. 보안사항

○ 과업수행자는 착수계와 함께 보안각서를 제출하고 과업 착수와 동시에 보안관리

책임자를 선정하여야 하며 본 과업책임자는 과업참여자 전원에 대한 자필 서명된

보안각서를 징구하여 제출하되, 과업참여자의 교체시에는 업무인계 인수를 철저히 하여

자료의 외부 유출을 사전에 방지하여야 한다.

○ 과업수행자는 자료보관함을 별도 확보하여 대외비 및 일반자료 보관함으로 구분하여

정부책임자를 지정하여 관리하고 작업장소를 제한구역으로 지정하여 외부인의 출입을

통제하여야 한다.

○ 과업과 관련된 모든 성과품과 자료는 발주기관의 승인 없이 과업수행자가 소유 또는 임의

복사하거나 외부로 유출해서는 아니되며 자료의 외부 유출 시 이와 관련한 민 형사상

행정상 책임을 진다.

5. 용역계약의 해지 등

○ 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한 계약 위반 행위로 간주하여

관련 규정에 따라 조치하고 계약해지를 요구할 수 있으며, 이 경우 과업수행자는

발주기관에 대한 손해배상 등 민형사상 일체를 청구할 수 없다.

- 본 계약을 수행함에 계약내용이나 과업지침을 위반하였을 때

- 과업수행을 성실히 하지 아니하거나 부주의로 인한 과실로 계약목적 달성이

불가능 하다고 판단될 때

- 계약기간 내 과업을 완료할 능력이 없다고 인정되거나 과업 진척이 현저히 지연될 때

- 과업의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

- 본 과업을 수행할 수 없는 상황이 발생하였을 때

- 기타 계약 조건을 위반한 때

6. 결과물의 저작권

○ 제출물의 저작권은 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반

사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

○ 과업수행자는 성과품을 발주기관의 승인없이 제3자에게 제공하거나 본 과업의 목적

이외에 사용할 수 없으며, 완료시 성과품 전부를 제출하여야 한다.

○ 제3자의 권리의 대상으로 되어있는 특허권 등을 사용할 때에는 과업수행자가 그 권리의

사용에 관한 일체를 책임 진다.

○ 준공 후라도 미비사항 발견시 과업수행자는 이를 보완해야 한다.

7. 과업수행 보고
○ 착수보고 : 용역 착수일로부터 14일 이내

- 과업수행 방향 및 방법

- 분야별 참여인력 및 조직 편성표

- 과업 세부수행 계획표 (예정공정표)

- 보안각서, 착수계, 현장대리인계 등 기타 과업수행에 필요한 사항

○ 공정보고 : 용역기간 중 월 1회(익월 5일까지 제출)

- 해당 월의 과업수행 내용과 다음 월의 과업수행계획을 서면으로 제출하여야 하며,

발주처의 요구가 있을 때에는 수시로 보고하여야 한다.

○ 중간보고 : 보고시기 별도 협의

- 공정률 50% 진행시 그간 추진경과 및 실적, 향후계획에 관한 중간보고를 실시한다.

- 보고 자료는 파워포인트로 준비하며, 필요 시 주민설명회와 병행 실시한다.

○ 설명회 등 : 1회 이상(개최시기 별도 협의)

○ 최 종 보 고 : 용역기간 만료 30일 전

8. 기타 유의사항

○ 과업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관의 협의사항, 발주기관의 지시

및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 비치하고 제출요구가 있을 경우

따라야 한다.

9. 성과품 제출

○ 성과품은 심의용 및 최종성과품으로 구분한다.

○ 심의용 자료는 발주기관에서 정한 전문가의 요구에 따라 작성, 사전검토 후 제출한다.

○ 계약상대자는 과업 완료전이라도 공사발주에 필요한 관계 도서에 대한 납품 요구가 있을 시는 우선 납품하여야 한다.

○ 최종성과품

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결 요약보고서	A4	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
	설계도면	A3	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
4	계산서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	관급내역서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가표	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	일반시방서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	특기시방서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	관급시방서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	조감도		1	부	◯							표구 포함
14	공정표		4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
15	USB		2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
16	기타 발주기관 요구사항

※ 각종 성과품 종류, 규격, 부수는 발주기관의 요청에 따라 조정될 수 있음

※ 보고서 작성시 활용된 모든 현장조사 및 분석자료는 편집이 가능한 전자파일

(xlsx, hwpx, pptx 등) 형태로 제출

※ 도량형은 국제 미터법을 사용

※ 보고서 작성시 인용된 참고자료는 각주에 의거 출처를 명시하여야 함.

Ⅲ	과업수행 일반지침

제1장 총   칙

제1절 일반사항

1.1.1 과업수행방법 및 책임한계

1. 과업수행 방법

1) 계약상대자는 「보령 충청수영 선소공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역」에 대한 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 정하며, 과업은 과업내용서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니 한 사항은 관계 법령 및 우리시의 방침, 정부제정 표준시방서(토목, 하수, 조경, 전기, 정보통신 등) 에 의거 수행하여야 하며, 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가와 협의하여 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 본 과업내용서와 발주기관에서 제공하는 자료 등에 따라 과업수행 시 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가의 지휘감독을 받아야 하며, 사업 책임기술자 및 분야별 책임기술자는 업체현황 편성 시 제출한 기술자를 본 용역에 투입하여야 한다. 단, 퇴직, 질병 등 특별한 사유가 있어 변경하고자 할 때에는 발주기관의 승인을 득한 후 동등 기술자(자격, 경력, 학력)이상의 자로 변경하여야 하고, 과업수행 도중에 부득이 변경하거나 발주기관의 필요에 의해 교체요구가 있을 경우에도 또한 같다.

3) 본 과업수행에 있어 각종 디자인관련 사항은 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가와 반드시 협의하여 선정하여야 한다.

4) 과업성격상 특정분야의 전문지식과 인력이 필요한 경우에는 발주기관의 승인을 득하여, 특정기관 및 업체에게 과업의 일부를 의뢰하여 시행 할 수 있다.

5) 용역수행 처리절차는 본 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로서 내실 있는 설계가 되도록 하여야 한다.

6) 발주기관은 과업수행 중 참여기술자가 과업 수행에 부적합하다고 인정될 때에는 수급인에게 참여기술자의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 교체하여야 한다.

7) 과업내용서의 내용에 있어 이견이 있을 때에는 상호 협의하여 결정하며, 발주기관의 요청에 따라 발주기관이 운영하는 자문위원회 및 관계전문가, 현상변경심의, 디자인심의 등 심의(자문)을 받아야 할 필요가 있는 경우 심의(자문)에 필요한 관련자료를 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가와 협의하여 준비한다.

8) 과업에 인용된 통계자료는 기획재정부, 국토교통부, 산업통상자원부, 충청남도, 보령시, 정부기관 및 한국은행 통계 및 발주기관이 승인한 공공기관의 자료를 활용하며, 인용한 통계자료는 반드시 그 출처를 명시하여야 한다.

9) 과업내용은 제반 관련법령에 적합하여야 하며, 법령의 개정이 예상되는 내용에 대하여는 개정방향에 따라 과업을 수행하여야 한다.

2. 책임한계

1) 설계오류

가. 설계내용이 표준시방서 등 설계기준에 비추어 하자가 있는 경우에는 “발주기관”의 검토․확인 등을 받아 작성된 도서라 할지라도 “계약상대자”의 설계오류에 대한 책임은 면제되지 않는다.

나. 성과품을 성실히 검토하여야 하며, 설계하자 및 오류가 있을 경우에는 이를 무상으로 즉시 수정․보완하여야 하고 최종 납품 되는 성과품에 대한 책임은 본   용역의 계약대상자가 전적으로 책임을 진다.

2) 보안사항

보안상 하자가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 “계약상대자”가 진다.

3) 안전관리

본 과업수행에 따른 안전관리 미흡으로 발생되는 모든 민․형사상의 책임은 계약상대자가 진다

1.1.2 착수신고서 및 기타 제출서류

“계약상대자”는 계약시 지방자치단체 용역계약 일반조건 V. 용역계약의 이행 규정에 따라 다음 서류를 각 3부 제출하여야 한다.

1. 착수신고서

- 사업착수 보고서

- 참여기술자 명단 및 사업책임기술자 선임계 (이력서 첨부)

- 기술용역 수행 예정공정표

2. 분야별 참여기술자, 장비투입계획 및 작업계획서

3. 보안대책 및 보안각서

4. 용역수행에 필요한 다음서류

- 내국기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

- 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

5. 기타 계약 공무원이 지정한 사항

1.1.3 과업수행계획서

1. 과업수행계획서 제출

“계약상대자”는 계약 후 10일 이내에 과업 수행계획서를 작성 “발주기관”에 제출하여 검토를 받아야 한다.

2. 참여기술자 서명

과업수행계획서에 참여기술자(총괄 및 분야별 책임기술자) 본인의 이름을 직접 기재한 명단을 작성 제출함으로서 설계자 책임의식 고취 등 설계수준을 향상시킬 수 있도록 설계 실명제의 내실화를 기하여야 한다.

1.1.4 업무협의 및 공정보고

계약자는 설계의 진행시 수시로 발주기관과 협의하여야 하며 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가에게 사전 보고하여 관련 자료를 제출하여야 하며, 다음의 경우에는 “발주기관”에 사전 보고하여 검토 받아야 한다.

1) 용역착수, 중간단계(2회), 마무리단계 검토 시

2) 기술심의 및 디자인심의 또는 설계자문(사업추진위원회)회의 시

3) 발주기관의 요청 또는 기타 중요사항 발생 시 등

1.1.5 관련기관 인․허가 및 협조

“계약상대자”는 본 과업과 관련하여 관계기관 협의 및 인․허가에 필요한 자료를 설계공정 진행에 따라 필요한 시기에 작성하여 제출하여야 하며, 작성 자료에 대하여는 “계약상대자”가 책임을 진다.

1.1.6 재료선정

공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업규격(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하며, 이를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 “발주기관”의 승인을 받되, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시하여야 한다.

1. 인체에 유해한 물질 (ex석면 등)이 함유된 자재는 사용하지 않도록 한다.

2. 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

1.1.7 타 계약 상대자와 업무한계

본 과업을 수행함에 있어 관련 법규내에서 다수의 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약자 상호간에 과업분할 협의서를 작성 수행하여야 한다.

1.1.8 발주기관 제공자료

"발주기관"은 계약상대자의 요구에 따라 본 과업과 관련된 기본 자료를 제공하며, 이는 참고용 자료로 계약당사자는 그 내용의 오류 및 정확성을 검토하여 확인 후 사용하여야 하며, 용역 완료 후 반납하여야 하고, 멸실 또는 훼손 시에는 대용품이나 손해를 배상하여야 한다. 본 도서는 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며 본 도서를 외부로 유출할 경우에는 "발주기관"의 허가를 득하여야 한다.

1.1.9 사용언어 및 문자

1. 과업 수행상 사용언어는 한글로 작성하며, 업무상 필요한 외국어의 통역, 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

2. 사용단위는 “계량 및 측정에 관한 법률”에서 규정한 단위를 사용한다.

3. 사용언어의 해석에 있어 발주기관과 계약상대자간에 의견을 달리하여 분쟁이 야기될 수 있으므로 이해가 상충되거나, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽게 풀이하여 정의한 후 사용하여야 한다.

1.1.10 환경친화적 설계

주변경관 파괴, 토양오염, 소음, 진동 및 분진의 발생을 최소화 할 수 있는 공법과 기술을 고려한 환경친화적인 설계기법 및 유니버셜디자인 등을 도입하여 설계에 반영하여야 한다.

1.1.11 기  타

본 과업내용에 명시되지 아니한 사항 (주민요구 사항, 기타) 등에 대해서도 발주기관의 지시가 있을 때는 성실히 수행하여야 한다.

1.1.12 하도급 사항

1. 계약상대자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2. 계약상대자는 발주기관으로부터 도급받은 용역에 관하여 관련법규 내에서 하도급계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 10일이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에 통지하고 승인을 받아야 한다.

(1) 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

(2) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

(3) 하도급 기간 및 하도급 금액

3. 계약상대자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

(1) 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

(2) 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한자

4. 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급 받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 10일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.

5. 책임한계

용역의 일부를 하도급한 경우에도 계약상대자는 당해 설계 등 용역에 대하여 모든 책임을 진다.

1.1.13 용역감독의 권한

1. 용역감독

발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가는 과업을 수행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인ㆍ감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

(1) 기술인력 동원현황

(2) 용역단계별 과업추진 내용 및 공정현황

(3) 기타 확인에 필요한 사항

2. 용역점검

발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가는 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한  사유가 없는 한 계약상대자는 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가와 협의하여 신속히 지적사항을 시정하여야 한다.

제2절 적용기준 및 시방서

1.2.1 적용기준 및 시방서등

적용기준은 가장 최근의 기준 및 시방자료를 적용하며, 관련규정 및 시방서가 개정된 경우 용역완료 3개월 전까지 수정된 최신기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가와 협의하여 적용한다.

1. 콘크리트구조 설계기준(국토해양부)

2. 콘크리트 표준시방서(국토해양부)

3. 토목공사 표준일반시방서(국토해양부)

4. 도로안전시설설치 및 관리지침(국토교통부)

5. 구조물 기초 설계기준(국토해양부)

6. 도로포장 설계, 시공지침(국토해양부)

7. 도로의 구조, 시설기준에 관한 규정(국토교통부)

8. 지하매설물 안전관리 요령(국토해양부)

9. 도로조명기준 KSA3701(공업진흥청)

10. 도로설계요령〈제1권～제5권〉 (한국도로공사)

11. 국가유산 설계도서 작성기준(국가유산청)

12. 설계용역 과업내용서

13. 기타 관련 표준시방서, 지침서, 기준 등

14. 관련규정 및 시방서가 개정된 경우 용역완료 전까지 수정된 최신기준을

적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 “발주기관”과 협의하여 적용한다.

15. 조경설계기준 (한국조경학회)

16. 신․재생에너지개발․이용․보급 촉진에 관한 법률

17. 공공기관 에너지이용합리화 추진 지침

18. 고효율에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정

19. 장애없는 보도 디자인 가이드라인

20. 보도공사 사업관리 매뉴얼

1.2.2 관련법령 및 기준

1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

2. 건설기술진흥법

3. 엔지니어링산업진흥법 -  엔지니어링 사업대가 기준

4. 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준

5. 시설물의 안전관리에 관한 특별법

6. 도로법 - 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙

7. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 - 도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 규칙

8. 전력기술관리법

9. 국가유산수리 등에 관한 법률, 문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률

10. 기타 관련법규 및 기준

11. 전기사업법 및 전기공사업법

12. 전기통신기본법 및 기술기준 등

1.2.3 통계자료

통계자료는 공신력 있는 기획재정부, 국토교통부 및 정부기관, 국가유산청, 한국은행 통계, 기타 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

제3절 과업내용 변경 조건

1.3.1 준수사항

1. 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 “계약상대자”는 본 과업지서서와 관계법령 및 제 규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

2. 과업수행중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

3. 본 과업내용서 명시되지 않은 사항이라도 “발주기관”이 과업수행상 필요하다고 인정하는 추가 과업에 대하여는 상호 협의하여 결정하며 “계약상대자”는 이를 성실히 수행하여야 한다.

4. 본 과업내용서의 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시에는 지장자치단체 용역계약 일반조건 제9절의 3. 분쟁의 해결에 따른다.

5. “발주기관”은 다음과 같은 사유로 “계약상대자”가 과업 수행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때는 해약할 수 있다.

1) 과업수행이 불가능하다고 인정될 때

2) “발주기관”의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

3) 기타 중대한 계약조건의 위반이 있을 때

1.3.2 설계변경 조건

1. 설계용역 수행중 설계변경사항이 발생하였을 경우에는 기술용역계약 일반조건(회계 예규)에 따른다.

2. 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경  사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

3. 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장 및 발주기관에서 정한 전문가에게 서면보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

4. 기타 정당한 사유가 있을 경우

5. 다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

1) 천재지변 또는 내우외환으로 작업이 불가능 할 때

2) 발주기관의 방침변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때

3) 계약이후 당초 설계수량이 현저하게 증감되었을 때

4) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 경우

제2장 조사 및 자료수집

제1절 일반사항

2.1.1 “계약상대자”는 당해 지역 내 국가유산과 기존시설, 지형, 토지이용분포, 각종 지장물 등 제반현황과 자료를 수집, 분석하여야 한다.

2.1.2 조사 항목

1. 현지답사

2. 측량(실시설계 필요 측량)

3. 지장물 조사(지하매설물, 지상시설물)

4. 수목 및 토양조사

5. 용지조사

6. 관련계획 자료조사

7. 기타 본 과업 수행 시 필요한 사항조사

제2절 조사내용

2.2.1 현지답사

“계약상대자”는 현지 답사하여 현지여건에 계획시설물이 적합한 지 여부를 확인하고 지형, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여야 한다.

2.2.2 측 량

1. 일반사항

(1) 시행방법

측량은 측량법 및 공공측량의 작업규정 세부기준에 관한 기준에 따라 시행하여야 한다.

(2) 측량작업계획서의 작성

“계약상대자”는 측량을 실시하기 전에 측량 작업계획서를 작성하여 “발주기관”의 승인을 받아야 하며 계획서에는 다음사항이 포함되어야 한다.

- 조사측량, 작업계획서(외업, 내업), 인원편성, 측량실시시기, 주요 기기, 특기사항, 위치도 등 기타 필요한 사항

(3) 안전관리

“계약상대자”는 측량작업 시 안전사고 방지에 유의하여야 하고, 안전사고 발생에 따른 모든 책임은 “계약상대자”가 진다.

(4) 관계기관의 제반 수속은 “계약상대자”의 부담으로 신속히 처리한다.

(5) 관련기관 협의

교통, 보행금지 또는 제한이 필요한 경우 경찰서 등과 협의 후 시행하여야 하며, 관련기관 협의 시 발주기관은 필요한 행정절차 이행 등 행정 지원을 한다.

(6) 각종 기준점은 변형이나 침하가 발생하지 않는 고정점으로 선정하고, 필요시 인조점을 두며 인조점은 기준점 1 개소당 3개 이상, 변형되지 않도록 설치하여 항상 기준점에 대한 확인이 가능하도록 하여야 한다.

2. 현황측량

(1) 기준점의 표기

각종 기준점이나 주요 측점은 도면 및 보고서에 표기한다.

(2) 측량의 범위

도로 중심선을 기준하여 양측으로 접한 대지를 포함한다.

(3) 도면의 작성

지정된 측량범위 외에 본 과업수행에 필요한 부분은 여유 있게 측량하여 교차로 주요건물 및 시설 등에 대한 지형지물 명칭을 기입하고, 지하 매설물 및 지상 공작물에 대한 현황을 포함하여 「공공측량의 작업규정에 관한 기준」에 따라 작성한다.

(4) 지적현황도 작성

현황측량의 성과와 우리시청에 비치된 지적도 및 도시 계획선을 확인하여 지적현황도를 작성한다.

(5) 수치현황도 참조

지형측량 성과표는 정읍시에서 제작한 수치지형도를 검토, 참조하여야 한다.

3. 종단측량

가 수준점(T.B.M)을 설치하고 매 측점마다 표고를 정확히 측정하며, 반드시 왕복으로 측량을 실시하고 측량성과는 오차의 한계를 넘지 않도록 하여야 한다.

4. 횡단측량

횡단측량은 중심선 측점마다 양측으로 도로계획 폭 2배이상 실측하여야 하며, 노선의 직각방향으로 시행하며 지형이 급변하는 지점 또는 구조물 설치지점, 선형분리, 확폭 등이 예상되는 구간에는 충분한 폭을 측량하여야 한다.

2.2.3 지장물 조사

1. 조사방법

계획구간의 각종 지하매설물 및 지상시설물의 저촉여부를 조사하고, 구조물 설치 개소 및 시공상 저촉되는 구간에 대해서는 정확한 탐사장비 등을 사용하여 위치를 정확히 확인하고, 부속시설물(상․하수도, 가스, 케이블 등)을 조사한다.

2. 확인 및 도면작성

현장조사 결과와 당해 시설물 관리부서의 관리도면 및 보령시에서 제작한 수치지형도(S=1:1,000)를 비교 검토하여 맨홀의 위치 등 지장물의 위치를 정확히 측량하고 지장물의 폭(직경), 매설심도를 표시한 지장물도를 작성, 제출하여야 하며, 조사 시 누락된 지장물 등에 의해 설계의 수정, 보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정조치 하여야 한다.

2.2.4 용지조사

1. 지장물 및 소유자 확인

본 과업에 편입되는 용지 및 지장물을 정확히 조사하고, 지목별, 지장물별(가옥, 수목 등)로 지번과 소유자를 확인하여야 한다.

2. 조사자료의 제출

지적조사에 따라 편입되는 용지에 대한 토지등기부등본 및 토지대장, 지장물에 대한 지장물 현황조사를 용지도와 함께 “발주기관”에 제출하여야 한다.

2.2.5 관련계획 자료조사

1. 제반사업의 연관성

본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성 있게 상세히 검토 반영하여야 한다.

2. 도시계획사항 및 토지이용계획

계획구간내의 도시계획 현황과 토지이용 계획 등 관련계획을 조사․검토하여 일관성 있는 사업계획을 수립하여야 한다.

3. 조치사항

“계약상대자”는 기존 도시계획시설 변경이 수반될 경우 도시계획 시설변경 결정고시를 위하여 필요한 자료를 “발주기관”의 지시에 따라 작성하여야 한다.

2.2.6 기타조사

1. 사전조사 또는 기본계획 등을 통하여 기 조사된 자료가 있는 경우에는 조사된 내용을 요약하여 기재한다.

2. 기 조사된 자료가 있으나 충분치 못한 경우에는 추가 조사범위, 조사물량 등 필요한 조사내용을 기재한다.

제3절 국가유산 및 디자인 경관계획

3.3.1 계획 및 중간설계에 따른 세부적인 디자인 안(계획안)이 확정되는 실시설계 초기단계에서 관련 기관 심의(자문)을 득할 수 있게 사전준비를 철저히 한다.

제3장 분야별 고려사항

제1절 국가유산과 보호 및 주변 경관 조성

3.1.1 모든 시설물의 계획은 국가유산의 보호와 보존, 국가유산 경관의 조화를 우선함

3.1.2 국가유산 관련 제반 규정을 준수하고, 국가유산 보호방안을 사전에 마련

제2절 배치계획

3.2.1 옥외조형물(판옥선) 별도 설치 예정(2단계 사업)이므로, 배치 계획시 설치 위치, 보행 동선, 공원과의 조화 등을 고려하여 마스터플랜을 계획

- 1단계 사업 : 선소공원(조경), 주차장계획, 관리동, 수공간, 판옥선 관람로, 산책길 등)

- 2단계 사업 : 판옥선(내부 전시공간 포함)

3.2.2 협소한 대지의 공간 활용도를 높일 수 있도록 집약적이고 효율적인 토지이용이 되도록 유도하며, 단순 명료한 보행 및 차량동선 체계 구성으로 공간의 이용 및 관리의 효율성 확보

3.2.3 단지 내 공원은 차량의 이동을 최소화할 수 있도록 주차장을 계획하고, 보행자와의 접점을 최소화하여 안전한 보행로 계획

3.2.4 선소공원 조성에 중요한 테마인 ‘판옥선’ 및 ‘수공간’은 공원 어디서든 자연스러운 시선으로 관람할 수 있도록 보행 동선과 효율적인 배치로 계획

3.2.5 방문객의 편의성과 공공성을 고려하여 외부 공간이 개방감을 가질 수 있도록 계획

- 개방공간(open space) 계획으로 여유 있는 외부 공간

- 시설 계획상 부득이한 경우를 제외하고 적극적이고 개방적인 이용을 도모하

여 대지의 경계와 건물의 주위에는 담장 등을 설치하지 않도록 하고 식재 등

으로 구획하는 등의 방법을 고려하여 폐쇄적인 인상을 주지 않도록 계획

- 국가유산과의 조화를 위하여 목구조 설계 적극 활용

3.2.6 과거 충청수영 선소를 재현하는 공원으로 조경, 토목, 건축 등 종합적인 계획을 수립하되, 별도 설치 예정인 판옥선을 고려하여 종합적인 마스터플랜을 수립

3.2.7 지역의 문화행사 및 다양한 모임 프로그램을 수용할 수 있는 잔디마당 또는 소광장을 계획

3.2.8 북서측~북동측까지 상가지역으로 조망 및 경관이 좋지 않으므로 나무 식재 및 조경을 통해 공원 내부에서 상가건물이 보이지 않도록 창의적인 아이디어 유도

3.2.9 공사범위는 남측 1~2단 옹벽과 국가지정문화유산구역 경계선까지로 설정하며, 남측 기존 녹지대는 원형보존으로 공사범위에서 제외

제3절 평면계획

3.3.1 실의 형태 및 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치는 기능별 집약배치를 통해 적합하게 배치

3.3.2 편의시설은 동선 방식(연속 순로 형식)에 유의하여 공간을 구성하고, 적절한 층고로 개방감과 쾌적한 관람공간이 되도록 계획

3.3.3 각 기능과 공간별로 사용 목적에 맞게 적절히 실들을 배치하여 독립적이면서도 기능상 중복되지 않도록 계획

3.3.4 공용공간은 이용자 동선, 시설 유지관리 및 설비공간 적정성 및 공간이용의 효율성을 고려하여 합리적으로 계획

3.3.5 화장실은 피크타임 전ㆍ후 인원을 고려하여 계획하여야 하며 방문객에게 쾌적한 환경을 조성하고 항상 청결한 환경을 조성

3.3.6 관리동은 공원 조망 및 자연 감시가 원활하도록 배치 및 계획

제4절 입면계획

3.4.1 보령 충청수영성의 역사 이미지 부각, 주변과의 조화를 고려한 조형성, 상징성 등을 부각시킨 입면이 되도록 계획(국가유산청 및 발주처와 협의 후 문화재 현상변경에 따른 기준 안에 적합한 입면 구성 적용)

3.4.2 입면의 다양성과 상징성을 고려하여 계획하며, 건축물의 후퇴(setback), 미적인  요소와 건축개념적인 요소가 어우러진 입면 계획

제5절 단면계획

3.5.1 각 기능별 집약화를 통해 단순 명료한 수직동선을 계획

3.5.2 업무공간은 자연채광과 개방감을 고려하여 밝고 쾌적한 공간이 될 수 있도록 적절한 천정고로 계획

3.5.3 지붕 형태는 박공지붕 형태를 지향하고 평지붕 계획 시 1/50 구배를 주어야 한다.

제6절 마감계획

3.6.1 건축물의 유지관리가 용이하며 내구성 및 내부식성, 친환경성을 높일 수 있는 재료로 계획

3.6.2 다중이용시설로써 내ㆍ외부 불연재, 준불연재 이상의 마감재 또는 이와 동등한 재료로 계획

제7절 외부공간 계획

3.7.1 공원 주출입구 및 부출입구에서 진입 시 넓은 오픈스페이스로 개방감과 시각적으로 인지도와 상징성을 높여 쾌적한 분위기를 연출

3.7.2 안정성을 위해 위험물이나 시설물 등 활동에 저해되는 요소들을 제거해서 부딪치는 일이 없도록 계획

3.7.3 포장면을 평탄하고 미끄럽지 않도록 처리하며, 일정한 방향성을 인지할 수 있는 포장패턴으로 계획

3.7.4 산책로는 범죄로부터의 안전을 위해 조명의 방향과 얼굴인식이 가능한 조도로 조명을 설치하고 산책로 주변으로 자연적 감시가 가능한 구조로 계획

3.7.5 녹지폭이 충분하도록 계획하며, 차폐식재에 의해 공간감과 독립적인 공간감을 형성

3.7.6 판옥선 주위 수공간은 관람객의 안전에 유의하며 유지관리, 기계실 등을 고려하여 창의적인 수공간을 계획

제8절 동선 및 주차계획

3.8.1 보행동선과 차량동선은 완전 분리로 안전성을 확보하고 서로 상충되는 경우 보행자 우선도로로 계획

3.8.2 보행공간은 접근성이 편리해야 하며 보행통로 주변에 시각적으로 흥미로운 요소를 도입해서 산책을 유도할 수 있도록 계획

3.8.3 보행동선과 차량동선은 완전 분리로 안전성을 확보하고 서로 상충되는 경우 보행자 우선도로로 계획

3.8.4 주차장은 현황도로에서 인접한 위치에 계획하여 짧은 동선을 계획하고 법적 주차대수 이상으로 계획하여 쾌적한 주차장 조성

3.8.5 공원 내 보행 동선은 안전을 기본으로 쾌적한 환경 속에서 다양한 공간과 행위를 유기적으로 연계할 수 있도록 계획

3.8.6 공원의 내부 공간은 누구나 안전하고 편리하게 이동 및 이용 가능하도록 하며 주요 시설은 보행안전공간으로 계획하고 공원의 지형, 주변 여건 등을 고려하여 이동약자 등을 포함하여 누구나 함께 이용 가능한 시설로 조성

3.8.7 공원의 주출입구 및 부출입구로부터 공원 내 주 이용시설을 연결하는 보행로는 주요 보도로 조성

3.8.8 자연 지형으로 불가피하게 기울기 확보가 어려운 경우에는 휠체어 이용자 등의 산책이 가능한 기준으로 적합한 산책 동선을 적용하고 안내 시설을 설치

제9절 친환경계획

3.9.1 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위해 각종 환경조절(제어)시스템과 설비시스템이  최적화 되도록 계획

3.9.2 에너지 효율을 고려한 실내공간의 경제적인 배치와 자연채광 및 자연환기를 사  용한 에너지 관리 시스템 계획

제10절 기타 사항

3.10.1 설계자는 Space program의 실별 수용인원을 참고하여 설비환경, 층고, 장비 종  류 및 하중, 반▪출입 동선, 부속실 등 감안하여 Space program에서 제시한 세부면적에 대하여 조정(변경)할 수 있다.

3.10.2 외부공간은 옥외주차장, 공원조성, 옥외 휴게공간, 테마공간 등으로 구성하도록 하고 장애인 주차 계획 시 주출입구 인접에 배치

3.10.3 편의공간은 시설 사용자가 이용 편의와 안전을 고려하여 적정위치에 배치되도  록 하고 외부를 통해 진입함으로써 공간의 위계성을 구현하는 등 상징성을 확  보

3.10.4 건물 이용 차량과 보행 동선과 분리하여 독립성을 유지하여야 한다.

3.10.5 기계·전기실 등 관련법에서 명시하고 있는 시설 외에는 주차장으로 최대한 확보하여야 하며, 적절한 층고 계획으로 공사비 절감을 유도하여야 한다.

3.10.6 편의시설은 장애인 및 노약자등을 포함한 이용자의 편의를 고려하여 로비에 근접 배치

3.10.7 각 실은 가변형 칸막이를 설치하여 장래 규모 변동에 융통성있게 대비할 수 있도록 하며, 음향을 고려한 내부마감재료 선택하고 잔향시간을 반영한 내부 천정계획에 따라 적정 층고로 계획

3.10.8 게릴라성 호우, 집중 호우 등 본 사업지 바닥 레벨을 주변 보다 높게 계획하여  배수가 원활하도록 계획

3.10.9 BF예비인증 및 본인증은 건물에만 적용하나, 대지 주출입구부터 건물 출입구까지의 연결되는 외부공간(공원)은 BF인증에 적합하도록 계획

제4장 실시설계

제1절 일반사항

4.1.1 본 과업 수행 시 주변 사업계획 등을 면밀히 검토하여 상호 연계되는 계획이 되도록 하고 협의사항을 도면표시 및 기록하여야 하며, 협의과정 등에 이견이 있을 경우에는 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가의 지시에 따른다.

4.1.2 주변의 관련 사업을 조사(용역의 범위, 공사의 시‧종점, 구조, 공사기간 등), 검토하여 설계에 반영한다.

4.1.3 측량 및 각종 조사 결과의 기본계획 결과에 따라 실시설계 한다.

4.1.4 구조물 설계 시 발주기관 및 발주기관에서 정한 전문가와 사전 협의한다.

4.1.5 각종 구조물은 구조계산에 의거 치수를 정하고 안전여부를 검토한다.

4.1.6 모든 구조물은 가장 합리적이고 경제적인 공법으로 설계되어야 하며 조형미를 고려하여 설계하여야 한다.

4.1.7 구조물 설계 시 주변상황, 기존구조물, 장래 공사 계획 등과의 관련사항 등을 검토하여야 한다.

4.1.8. 디자인 변경 및 결정사항이 설계에 반영되도록 디자인용역 및 발주기관, 발주기관에서 정한 전문가, 또는 지역민 등과 협의한다.

4.1.9 실시설계의 업무범위

1. 설계 개요 및 법령 등 각종 기준 검토

2. 계획 및 중간설계 결과의 검토

3. 설계요강의 결정 및 설계지침의 작성

4. 구조물 형식 결정 및 설계

5. 구조물별 적용 공법 결정 및 설계

6. 시설물의 기능별 배치 결정

7. 공사비 및 공사기간 산정

8. 기본공정표 및 상세공정표의 작성

9. 시방서, 물량내역서, 단가규정 및 수리계산서 작성

제2절 시설물 설계

4.2.1 정밀성과 함께 융통성 있게 설계한다.

4.2.2 인간공학에 바탕을 준 기능적 스케일로서 설치상황에 적합한 치수를 선택한다.

4.2.3 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계한다.

4.2.4 과업지역 내 설치되는 시설물은 전체적으로 통일된 분위기를 연출하도록 한다.

제3절 조경설계

4.3.1  지형설계

1. 현황 및 분석도면을 준비하여 필요한 사항을 점검한다.

2. 현 식생의 상태, 유용성, 이식비용, 대치비용 등을 고려·평가하여 보존, 이식, 제거 등의 대상수목을 결정한다.

3. 기존 구조물의 마감, 바닥의 고저 등을 고려하여 지반의 안정과 적절한 배수가 보장되도록 지형을 변경한다.

4. 공공의 도로는 개인에 의하여 변경될 수 없으므로, 기존 도로와 접하는 부분의 처리에 유의한다.

5. 기존 지형의 경사나 침식의 정도를 파악하여 노변 비탈면의 적절한 경사를 정한다.

6. 기존의 지형과 자연스럽게 접하도록 부지의 경계선을 확인한다.

7. 부지경계선 가까이 존재하는 도로, 건물, 설비구조물, 지하매설물 등을 점검하고, 이들과의 연관성을 고려한다.

4.3.2 식재설계

1. 식재설계 시 각 수종에 적합한 식재밀도와 수목간격을 유지한다.

2. 지역적 특성과 지형의 고저차 등에 따라 교목과 상록, 낙엽수와 상록수를 조화롭게 식재한다.

3. 식재설계는 지역의 특수성을 감안, 여건에 맞게 식재 방식을 이용하고 자유롭고 안정된 배식방법을 시도한다.

4. 식물생육이 불리한 식재기반은 충분한 토심을 확보하고 생육을 위한 별도의 조치를 강구한다.

5. 사람이 휴식하거나 모이는 장소에는 녹음을 제공할 수 있도록 식재한다.

6. 수림 조성 시 상층, 중층, 하층의 구성이 되도록 군락식재를 한다.

7. 식재 설계 시 계획 및 중간설계 수립완료 시점에서 수종 및 규격별 수급계획을 보고한다.

8. 사업 디자인 콘셉트와 대상지 여건을 아우르는 특화된 가로형으로 검토 설계한다.

4.3.3 이식설계

1. 이식 대상 수목은 식생조사를 통해 선정한다.

2. 이식 대상 수목의 크기는 현지조사를 통해 직접 재어서 결정한다.

3. 수목의 규격을 다른 방법으로 표시한 경우는 별도 기준에 의해 환산한다.

4. 가식의 경우에는 식재부분을 80%만 적용한다.

5. 이식을 위한 규격은 원칙적으로 근원직경을 적용하며, 근원직경에 대한 표시가 없을 경우에는 설계기준을 참조하여 흉고직경과 수고를 각각 근원직경으로 환산하여 적용한다.

4.3.4 시설물설계

1. 휴식시설설계

(1) 휴게소, 벤치, 야외탁자 등은 점경물로서 공간구성요소로서의 성격을 지니기 때문에, 주변시설이나 식재 등과의 연관을 고려하여 배치하여야 하며, 국가유산청의 「문화재 주변 시설물 등에 대한 공공디자인 지침」에 준하여 설계한다.

(2) 최소량을 설치한 후 이용실태를 고려하여 필요한 경우에 추가로 설치한다.

(3) 벤치, 야외탁자들은 기능, 이용방법 등에 따라 분산배치나 집중배치에 대한 검토가 필요하다.

2. 안내표지시설설계

(1) 모든 안내표지시설은 유도시스템, 해설시스템, 교통시스템 등의 종합계획을 통하여 기능과 배치를 설정하도록 하고 설계에 필히 전문가 의견 반영하며, 국가유산청의 「국가유산 안내판 정비 통합 가이드라인」에 준수한다.

(2) 각 안내표지시설에 표시하고자 하는 구체적인 정보(위치도, 설명 등)가 표현되도록 하여야 한다.

(3) 기능과 목적에 맞는 내용, 형태, 배치 및 시각구조를 갖추도록 설계하여야 한다.

(4) 다양한 요소들은 분리되는 것보다는 집합적으로 구성되도록 하고, 안내대상 시설물간의 상호관계를 보다 유기적으로 파악하여 군(群)으로 설계하도록 한다.

(5) 최소한의 설치로 최대한의 효과를 얻을 수 있도록 하며, 여러개의 표지가 설치되어야 할 장소에는 다수의 독립된 표지보다는 종합표지판을 설치하도록 한다.

(6) 안내표지시설이 교통과 전망에 방해가 되어서는 안되며, 주변요소가 안내표지시설을 가려서도 안된다. 특히 나무가지, 전주 등과의 관련에 주의한다.

(7) 초심자에게도 친절한 안내가 될 수 있는 완전한 써비스 기능을 갖도록 내용을 구성한다.

(8) 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조적으로 안정되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계한다.

(9) 사업대상지의 아이덴티티(Identity)를 느낄수 있도록 각종 문양, 색채 등을 설계한다.

(10) 사업의 이미지를 명료히 하고 품위를 높여줄 수 있도록 하며 주변의 환경과 더불어 좋은 경관요소로 활용될 수 있도록 적극적으로 디자인하여야 한다.

(11) 청소, 도장, 보수 등의 유지관리가 용이한 위치에 설치한다.

3. 수경시설설계

(1) 각 장치가 유기적으로 결합하되 물의 연출에 중점을 두고 주변경관과 조화되어야 한다.

(2) 유지관리 및 점검보수가 용이하도록 설계한다.

(3) 적설, 동결, 바람 등 지역의 기후적 특성을 고려한다.

(4) 초기 원수 및 보충수 확보를 고려하여 설계한다.

(5) 급수원을 확인하고 양호한 수질의 유지가 가능한 설비로 설계한다.

(6) 내구성과 안전성, 미관을 동시에 추구한다.

(7) 에너지의 효율성을 고려한다.

(8) 원활한 급수을 위하여 충분한 수량을 확보한다.

(9) 바이패스(By Pass)와 워터디텍터(Water Detector)를 설치하여 자동급수시스템을 갖추어야 한다.

(10) 강우 및 바람의 영향을 대비하여 강우량센서 및 풍속, 풍향센서를 설치한다.

(11) 급수원은 상수, 지하수, 중수, 하천 등 현지여건에 따라 적용한다.

(12) 설계수질은 수경시설의 설치목적, 수경시설의 종류, 주변환경 및 공급원수의 수질과 수량 등을 충분히 검토하여 설정한다.

(13) 수경시설 구체의 방수는 담수형태와 특성에 따라 사전에 충분히 고려한다.

제4절 건축물 설계

4.4.1 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

4.4.2 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

4.4.3 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

4.4.4 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

4.4.5 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

제5절 토목설계

4.5.1 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

4.5.2 구조 및 수리계산서

4.5.3 시방서

4.5.4 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

4.5.5 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

제6절 도로 및 포장설계

4.6.1 각종 도로는 도로의 구조․시설기준에 관한 규정 및 지침에 의거하여 포장의 용도 및 원지반 조건에 적합한 포장설계가 되도록 한다.

4.6.2 동선은 종류에 따른 이용자의 빈도, 경제성, 유지관리, 미관 등을 고려하여 설계한다.

4.6.3 바닥 포장은 도시 정서에 맞는 포장이 되도록 디자인을 발전시킨다.

제7절 보도포장 설계

4.7.1 기본계획에서 제시한 보도포장에 대하여 면밀히 검토하여 각 블록별 패턴에 적합하며, 시공성, 내구성, 경제성 등을  종합적으로 고려하여 우수한 재질을 선택하여야 한다.

4.7.2 기본구상 수립시 각 구간별 보도포장 패턴을 제시하고 설계자문회의 또는 주민의견 청취 등을 통하여 최적안을 확정한다.

4.7.3 보도의 마감재는 미관과 내구성을 고려하여 설계하고 최근 고품격의 신소재를 적극검토 반영 설계하고 보도 및 계단 처리 시에는 지체 부자유자를 고려한 시설로 설계한다.

제8절 전기 ․ 통신설비 설계

4.8.1 기본원칙

전기 및 통신시설은 거리의 기능을 충족할 수 있는 설비로서 다음 사항에 적합하게 시설한다.

1. 건물 및 주변 조경물과의 유기적 조화.

2. 야간 이용객의 편의 및 우범지대화 방지

3. 조명율 이용 극대화 및 관리 운영비 저렴

4. 전기사업법, 전기공사업법, 전기용품 안전관리법, 건축법, 전기통신법, 소방법 등 관련 법규에 적합

5. 수전시설은 한국전력측과 사전 협의하여 결정하고, 경제적이며 효율적인 방법으로 설계한다.

6. 계절별, 시간대별, 이벤트행사별 조명제어계획

7. 기존시설물 활용계획

4.8.2 가로등 및 공원등 설치

1. 야간의 도로이용자의 안전하고 쾌적한 도로이용을 확보하여야 한다

2. 공원등은 건축물 및 주변 조경시설물과 조화를 이루도록 설치.

3. 산책로 및 광장주변 등 적정조도 유지를 위한 원격관리 기능 설치.

4. 조형시설물 및 기타 국부조명을 필요로 하는 개소는 투광설비 설치.

5. 건축물 및 조경  경관을 필요로 하는 개소에는 경관조명 설치

6. 에너지 절감을 위한 최신 저전력 등기구 설치

4.8.3 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

4.8.4 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

3.8.5 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

4.8.6 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

4.8.7 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

제9절 기계설비 설계

4.9.1 수경시설을 설치할 경우 이용목적에 적합한 수질기준을 유지할 수 있도록 여과 및 정화  시설을 설치한다.

4.9.2 기계설비의 시설 및 이용의 안전을 확보할 수 있도록 안정성을 고려하여야 한다.

4.9.3 분수설비 등의 기계설비 및 유지용수에 대한 설계지침

4.9.4 주요설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래설비 증설․변경, 에너지절약설계기준 등을 고려한 경제성 검토

4.9.5 신 ․ 재생에너지 이용설비 설치계획 검토

4.9.6 유지관리의 편리성을 고려한 시스템 채택

4.9.7 수경설비 중 시설 구상에 있는 분수설비계획 검토

4.9.8 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

4.9.9 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

4.9.10 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

4.9.11 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

4.9.12 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

제10절 정보통신 설계

4.10.1 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

4.10.2 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

4.10.3 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

4.10.4 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

4.10.5 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료

제11절  랜드마크(Land Mark) 활용방안(설계에 반영할 경우)

4.11.1 특색 있는 공원 조성에 의거 랜드마크 기능을 통한 구간별 가로 인지도 증진효과 방안을 제시하여야 한다.

4.11.2 상징적인 조형물(판옥선)에 의한 가로 구간별 특이성, 공간적 배치 등으로 주위의 경관중에서 두드러지게 나타날 수 있도록 하여야 한다.

4.11.3 랜드마크는 전시효과만을 위한 결과물이 아닌 사업계획 전체를 아우르는 컨셉트에 따른 랜드마크의 계획을 제시하여야 한다.

제12절 광고물 정비 방안 수립

4.12.1 과업대상지의 주위 경관을 고려한 정비 방안을 작성하여야 한다.

4.12.2 향후 광고물 정비 시 주민들이 자발적으로 참여할 수 있는 방안을 제시하여야 한다.

제13절 기타 부대시설 설계

4.13.1 도로표지판

도로표지판은 이용자의 편의 및 안전을 고려하여 설계하여야 하며, 표지판의 재질은 내구성과 경제성 등을 비교하여 설계하여야 하며 도로표지판 체계 등에 대하여는 사전에 “발주기관”과 협의하여야 한다.

4.13.2 도로 및 교통관련 안전시설은 디자인의 우수성 외에 안전이 확보되어야 하고, 이러한 안전시설의 디자인이 디자인거리 계획안에서 조화를 이룰 수 있게 설계한다.

4.13.3 기 타

기타 부대시설의 설계는 “발주기관”과 협의하여 설계한다.

제14절 지장물 이설 설계

4.14.1 지장물이설 계획 및 이설비의 산출

시공장비, 작업공간, 고압선 등 시공장비 사용에 지장을 주는 지장물을 포함하여 지장물중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상․하수도관, 가스관, 통신케이블, 고압  케이블, 송유관 등) 해당기관과 협의하여 모든 시설물(분전함, 개폐기, 관로, 케이블, 소화전 등)이 완전지중화가 되거나 인접건물내부로 이전설치 되도록 설계하고 이설비를 산출  하여 협약금액을 공사비에 반영하여야 한다.

4.14.2 이설공사 시기 등

이설계획은 지장시설물 관리부서의 확인을 거쳐 모든 지장물은 지중으로 이설토록 설계하고 공사 착공 후 이설 시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 삽입하여야 한다.

4.14.3 보호방안의 수립

공사시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관(관리자)과 협의하여 적절한 보호방안을 수립 공사 중에 손상이 없도록 한다.

제15절 유지관리시설

4.15.1 건설 후 유지관리에 필요한 유지관리시설의 종류, 점검항목 등을 검토하여 제안한다.

제16절 공사실명제

4.16.1 공사실명제 시행을 위한 준공표지판 설치비용을 설계에 반영한다.(필요시)

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 20  .   .

3. 착수  일자 : 20  .   .

4. 완수예정일 : 20  .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

2025년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

보령시장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 20  .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2025년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

보령시장 귀하

〔붙임 3〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .

4. 착수일자 : 20  .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2025년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

보령시장 귀하

〔붙임 4〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2025년  월  일 ～ 2025년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2025. . . ～ 2025. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

보령시장 귀하