북측 화물터미널지역 편의지원시설 설계용역

과 업 내 용 서

2022. 12.

	미래사업본부 물류처

						목 차

		제 1장 용역일반조건

북측 화물터미널지역 편의지원시설 설계용역

제1장  용역일반조건	1

1.1  용어의 정의	2

1.2  적용기준	3

1.3  용역 관리담당지의 지정 및 관리업무	4

1.4  용역수행조직	5

1.5  계약상대자의 의무	8

1.6  정산 및 세금	11

1.7  계약변경	12

1.8  보안사항	14

1.9  설계 성과품 및 저작권 소유	15

1.10 위반행위의 조치 및 분쟁의 해결	16

1.11 기타사항	17

제2장  용역의 내용	19

2.1  과업의 개요	20

2.2  과업의 착수	23

2.3  공정보고 및 업무회의 등	25

2.4  성과물제출	26

2.5  관련법규 및 기준	26

제3장  설계 세부지침	29

3.1  설계 일반지침	30

3.2  건축분야	33

3.3  토목분야	36

3.4  기계설비/전기/통신/보안/기타분야	40

제4장  기타 용역수행방법	49

4.1  일반사항	50

4.2  공정관리	51

4.3  자료관리	52

4.4.  환경관리	53

4.5  품질관리	53

4.6  설계심의 ․ 자문 등	54

4.7  기타사항	54

4.8  간섭사항 사전 체크	56

4.9  사업지원	56

제5장  용역성과품 작성 및 납품	58

5.1  작성원칙	59

5.2  작성 세부내용	61

5.3  제출도서 목록	78

		제 1장 용역일반조건

북측 화물터미널지역 편의지원시설 설계용역

제1장  용역일반조건

1.1	용어의 정의

1.1.1	“공사”라 함은 본 설계용역을 발주한 인천국제공항공사를 말한다.

1.1.2	“계약상대자”라 함은 “공사”와 본 설계용역을 계약체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

1.1.3	“용역관리담당자”라 함은 “공사”에서 본 용역의 관리업무를 수행토록 지정한 담당자를 말한다.

1.1.4	“사업책임기술자”라 함은 “계약상대자”가 본 용역전체를 총괄․책임지도록 지정한 대표기술자를 말한다.

1.1.5	“분야별 책임기술자”라 함은 “계약상대자”가 본 용역 해당분야(공종)를 총괄․ 책임지도록 지정한 기술자를 말하며, “사업책임기술자”를 보좌하고 필요한 기술지원을 해야 한다.

1.1.6	“참여기술자”라 함은 “사업책임기술자”, “분야별 책임기술자”를 포함한 “계약상대자”가 본 용역에 투입하는 기술자를 말한다.

1.1.7	“기본설계”라 함은 기존 시설 현황과 설계공모작을 토대로 기타 관련 용역 등을 참고하여 실시설계 전에 필요한 계획설계 및 중간설계를 수행하는 단계를 말한다.

1.1.8	“실시설계”라 함은 기본설계를 토대로 목적시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법 및 기간, 소요비용, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 4비교․검토를 통하여 최적 안을 선정하고 상세설계를 수행하며, 시공․시운전 및 유지관리에 필요한 기술 자료를 작성하는 단계를 말한다.

1.1.9	“조사업무”란 현장조사, 자료수집 등 각 용역 단계별에서 명시한 내용을 조사․검토 분석하고, 그 결과를 종합하는 업무를 말한다.

1.1.10 “계획업무”란 조사업무의 내용을 바탕으로 여러 대안을 계획하고, 비교․검토하여 용역단계별 과업의 목적에 부합하는 최적 안을 선정하는 업무를 말한다.

1.1.11	“설계업무”란 조사업무, 계획업무의 결과에 따라 단계별 용역과업의 목적에 부합하는 시설 및 시스템, 기타 부대사항 등을 기술적으로 구체화하여 설계 도서를 작성하는 것을 말한다.

1.2	적용기준

1.2.1	"계약상대자"는 관련법규와 제 기준, 설계공모지침, 과업내용서, 과업수행계획서, 설계공모 제출안 등에 의거 본 과업을 수행하여야 한다. 과업내용서 등의 입찰 안내서에서 업무수행에 대한 이견이 발생할 경우 당사자 간 협의에 따른다.

1.2.2	관련법규 및 과업내용서 등 입찰안내서에 명시되지 않은 사항은 “공사”와 사전 협의하여 결정하며, 본 과업내용 중 제반여건의 변화 등으로 누락되어 추가되거나, 또는 필요 이상의 과업으로 일부가 삭제되는 경우 "공사"와 "계약상대자"가 상호 협의하여 과업 내용을 조정할 수 있다.

1.2.3	본 용역의 기준언어는 한국어로 하며, 부득이한 경우 일부 용어는 영어를 사용할 수 있고, 이때 영어는 한국어로 번역해야 한다. 용어상, 해석상 견해차가 있을 경우에는 한국어가 우선한다.

1.2.4	본 용역에 사용되는 단위는 SI단위(필요시 “CGS” 단위)로 한다.

1.2.5 설계규모는 설계 과정에서 "공사"와 "계약상대자"가 협의하여 과업 대상 연면적의 ±10% 이내로 조정할 수 있으며 과업범위의 변경이 없을 경우 공사비가 증가하더라도 추가 용역비를 지급하지 않는다.

1.2.6 용어의 해석

가. "공사"와 "계약상대자"는 “용역계약일반조건(기획재정부계약예규)”에 따라 계약을 이행하고, 본 과업내용서의 용어 해석에 차이가 있을 경우에는 "공사"와 "계약상대자"가 상호 협의하여 결정한다.

나.  관련법규 및 본 계약서, 과업내용서 등 계약관련 서류에 명시되지 않은 사항은 "공사"와 사전 협의하여 결정한다.

1.2.7 "공사"와 "계약상대자"는 인천국제공항공사 사규 및 지침서에서 본 용역에 대해 정의하는 바에 따라 계약을 이행하여야 한다.(계약관리지침서, 설계 등 용역 및 공사 관리규정, 설계관리절차서 등)

1.2.8 "계약상대자"는 인허가 및 필요시 공사 완료 시점에 맞는 현행 법령, 기준을 재검토하여 적용하여야 한다.

1.3	용역 관리담당자 지정 및 관리업무

1.3.1	용역 관리담당자는 용역이 단계별로 적합하게 수행될 수 있도록 다음 사항을 관리한다.

가.	계약서, 과업수행계획서 등에 "계약상대자" 의무사항의 수행정도 등 과업내용에 의한 품질 및 결과 확인

나.	계획공정에 따라 용역이 적정하게 수행될 수 있도록 용역의 공정관리    (공정부진 시 만회대책 수립요청 및 필요한 조치 등)

다.	용역의 진행에 따른 기성, 준공 및 용역비 지급 등에 필요한 관리업무

라.	참여기술자 투입․관리 및 업무수행 등의 관리 및 확인

마.  하도급 관련사항

바.	기타 과업수행에 필요한 사항

1.3.2	담당자는 정기 또는 수시 점검을 통하여 설계품질을 확인할 수 있으며, 설계 품질 향상을 위한 지적사항에 대해 "계약상대자"는 특별한 사유가 없는 한 이를 즉시 시정하여야 한다.

1.3.3	"계약상대자"는 설계진행에 따른 기성․준공 및 용역비 지급 등과 관련하여 담당자가 수행하는 업무에 협조하여야 한다.

1.3.4	"계약상대자"는 본 사업의 추진을 위해 "공사"가 설계감리(또는 사업관리용역) 계약을 체결할 경우 설계감리 계약상대자는 본 용역수행과 관련한 "공사"의 대리인으로서 "공사"와 동등한 권한을 가진다는 것을 인지하고 용역을 수행하여야 한다.

1.3.5	"계약상대자"는 "공사"가 QA 감사, 검사 및 평가, 관리 등의 목적으로 "계약상대자" 및 하도급업체 시설에 출입 및 관련서류 열람 요청 시에는 이에 응하여야 한다.

1.4	용역수행조직

1.4.1	"계약상대자"는 본 설계 용역의 과업내용에 따라 "공사"와 협의하여 용역수행 조직을 구성 및 운영하며, 사업책임기술자(건축분야)에게 분야별 설계내용의 통합조정업무를 진행하고 간섭사항을 사전에 조치할 수 있는 권한을 부여하여야 한다.

1.4.2	본 용역의 참여기술자는 과업수행계획서에 따라 담당 업무가 원활하게 이행될 수 있도록 해야 하며, “공사”는 참여기술자가 다음 각 호에 해당하는 경우에는 교체를 요청할 수 있으며, “계약상대자”는 적절한 조치를 취하되, 본 용역수행에 지장이 초래되지 않도록 해야 한다.

가.	관련법규, 제 규정 및 본 계약내용을 위반 한 경우

나.	“공사”의 동의 없이 타 업무에 종사하거나 용역에 참여하지 아니할 경우

다.	업무수행능력 및 기술이 현저히 부족하여 용역수행에 차질(공정지연 등)을 초래한 경우

라.	고의 또는 과실로 인하여 설계 품질 저하 또는 부실설계를 하였을 경우

마.	용역관리담당자 및 업무담당자의 정당한 요청사항에 응하지 않는 경우

바.	"공사"의 정당한 계약관련 요청사항을 불성실하게 수행하는 경우

사.	용역담당자의 정당한 요구사항에 응하지 않을 경우

아.  기타 사유(질병, 사망, 사직 등)로 정상적인 업무수행이 곤란한 경우

1.4.3	참여기술자 교체로 인한 업무지연 등에 대해서는 즉시 만회대책을 수립 시행하고, 이로 인하여 발생되는 제반비용은 “계약상대자”의 부담으로 한다. 또한 “계약상대자”는 참여기술자의 교체 시에는 업무인수인계를 철저히 하여 업무의 연속성이 유지되도록 해야 한다.

1.4.4	본 용역의 "계약상대자"가 공동수급체인 경우 다음사항에 따라 용역을 수행하여야 한다.

가. "계약상대자"는 과업 착수 전에 공동수급체의 운영위원회 구성에 관한 사항, 현장조직 및 인원투입계획, 회계사무, 업무한계, 용역 비율 등을 명기한 “공동수급체 이행계획서”를 작성․제출하여야 한다.

나. "계약상대자"는 공동수급체 내부의 구성 및 합의내용 등을 재조정 또는 변경하여야 할 필요가 있을 경우에는 사전에 "공사"의 승인을 받아야 한다.

다. 공동수급체 내부 구성원 및 각종 공동"계약상대자" 간의 분쟁은 자체적으로 해결하여야 하며, 분쟁을 이유로 본 용역과 관련한 제반업무 수행에 영향을 미치는 어떠한 행위를 하여서는 안 된다.

라. "계약상대자"는 본 용역의 모든 용역과업을 대표하여 수행할 대표자를 공동수급체의 대표자로 선임하며, 선임된 대표자는 "공사"와의 업무연락 및 조정, 계약관리 등 용역업무 전반에 대한 업무의 단일 창구가 되도록 하여야 한다.

1.4.5	하도급

가. "공사"와 "계약상대자"가 용역수행 상 필요하다고 판단하는 부분과 "공사"가 특별히 지정하여 "계약상대자"와 협의된 분야는 국내외 전문업체와 기술을 제휴하거나 협력하여 용역을 수행 하여야 하며, 이에 따른 업체선정은 하도급 관련규정에 따른다.

나. "계약상대자"는 본 계약서에 명시된 당해 용역이행을 "공사"의 승인 없이 제3자에게 하도급 할 수 없으며, "계약상대자"의 임의적 또는 부당한 양도, 이전, 하도급 행위가 드러날 경우, 계약조건에 따라 해지 등의 조치를 취할 수 있다.

다. "계약상대자"는 용역수행과 관련하여 과업내용 일부(외국전문업체 또는 기관이 수행하는 과업 포함)를 하도급 하고자 할 경우에는 하도급 관련내용(필요성, 범위, 기간 및 금액, 하도급 받은 용역사의 해당분야 실적 및 참여기술자 현황 등)을 "공사"에 제출하여 사전승인을 받아야 한다. 하도급 계약내용을 변경하고자 할 경우에도 같다.

1.4.6	“계약상대자”는 공동수급업체 및 하도급업체의 각 분야별 설계금액 및 비율을 명시하여한다.

1.4.7	“계약상대자”는 내부 구성원 및 각종 공동계약상대자 간의 분쟁에 대하여 자체적으로 해결해야 하며, 분쟁을 이유로 본 용역과 관련한 제반업무 수행에 영향을 끼치는 여하의 행위를 하여서는 안 된다.

1.5	계약상대자의 의무

1.5.1	“계약상대자”는 최신의 기술지식을 바탕으로 제반 기준에 따라 신의와 성실의 원칙에 따라 계약의무를 완수하여 시공사 등과 클레임이 발생하지 않도록 현장조건에 부합하는 설계를 해야 한다.

1.5.3	“계약상대자”는 본 용역 수행 중 발생하는 제반 문제점과 이에 대한 해소방안을 수립하여 사안별로 “공사”에 제출해야 하며, 특히 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하고 "계약상대자"의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 사고 및 손해에 대하여 전적으로 책임을 져야 한다.

1.5.4	"계약상대자"는 본 용역을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 한다. 또한 그 배상을 담보하기 위해 관련 법규정에 따라 손해배상보험 또는 공제에 가입하여야 하며, 용역완료 전까지 그 증빙서류를 "공사"에 제출하여야 한다.

1.5.5	“계약상대자”는 본 용역을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, “공사”의 요청 및 협의사항, 각종 회의사항 등 주요내용은 기록․관리해야 하며, “공사”의 요청이 있을 경우 해당 자료를 제출해야 한다.

1.5.6	“계약상대자”는 본 용역의 참여자의 업무내용(기간․수행업무)을 적합하게 기록하여 관리하고, “공사”가 요청할 경우 해당 자료를 제출해야 한다.

1.5.7	과업보완에 대한 의무사항

가.	“계약상대자”는 용역기간 중 또는 용역완료 후에도 다음과 같은 사항에 대하여는 “계약상대자” 비용부담으로 검토․반영해야 한다.

1)	“계약상대자”는 “공사”의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, “계약상대자”의 귀책에 의한 착오, 내용의 누락, 기준적용의 오류 등으로 발생한 모든 설계 오류 및 하자사항에 대한 책임을 진다

2)	용역수행내용이 관련법 등 제 기준에 적합하지 아니하거나, 현장조사의 부실로 설계의 불합리함이 인정되어 "공사"가 요청하는 사항

3)	본 용역수행에는 필요하나, 본 계약조건 및 과업내용서 등에서 누락된 통상적으로 인정되는 수준의 사항

4)	심의․자문, 인․허가 관계기관 및 전문기관의 의견, 이해당사자의 의견 등을 검토․반영하여 설계내용을 변경해야 할 사항

나.	설계내용이 사전에 제시된 집행예산의 수준이나 기술적 구현능력에 부합되지 않아 현장적용에 불합리한 사항 등의 발생으로 개선을 위해 “공사”가 설계변경을 요청할 경우에는 즉시 조치해야 한다.

1.5.8	행정행위의 지원 및 이행

가.	“계약상대자”는 동 사업시행에 필요한 행정사항(인․허가 : 공항개발사업 시행허가, 실시계획승인 등)을 지원 및 이행해야 하며, 이에 필요한 각종 설계관련 자료를(성과품 제출 수량과는 별도) “공사”가 정하는 기일 내에 제출해야 한다.

나.	“계약상대자”는 필요시 관련 심의, 자문위원회, 관계기관(단체) 등에 용역의 현황을 보고․설명해야 하며, 지적된 사항은 비교․검토 후 설계내용을 수정, 보완해야 한다.

다.	“계약상대자”는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축협의에 필요한 서류를 적성하여 제출해야 한다.

라.	“계약상대자”는 용역기간 중 또는 완료 후에라도 착공에 필요한 제반 행정절차가 조속 처리될 수 있도록 협조해야 한다.

마.	“계약상대자”는 건축물대장 등재 등 시설의 준공 및 인․허가와 관련된 행정절차가 차질 없이 이행될 수 있도록 지원해야 한다.

바.	“계약상대자”는 대상시설물의 착공 전․후 및 시설 운영 등 전 과정에 걸쳐 “공사”가 관련법에 따라 취득해야 하는 각종 인․허가, 신고 등의 ‘인․허가취득계획서’를 "공사"의 협의를 통해 필요시 제출해야 한다.

1.5.9	“계약상대자”는 시공과정에서 발생되는 다음과 같은 설계변경 사항에 대하여 신속하게 협조 및 조치해야 한다.

가.	“계약상대자”의 귀책사유로 인한 설계도서(도면, 설명서, 내역서 등)의 오류, 누락사항 처리를 위한 설계변경통보서(DCN) 작성

나.	시공계약상대자가 현장시공 대안제시, 시공변경․수정 등을 목적으로 발행하는

현장 설계변경요청사항에 대한 검토 및 의견 제시

다.	설계의도의 구현을 위하여 기타 시공과정에서 원 설계자가 처리해야 할 통상적인 사항

1.5.10	“계약상대자”는 과업내용서에는 기술되어 있으나 실제 과업에 반영되지 않은 사항에 대하여는 사전에 “공사”와 협의하여 반영 여부를 결정한다.

1.6	정산 및 세금

1.6.1	본 용역 계약금액에는 "계약상대자"가 설계용역을 수행하기 위한 인건비를 비롯하여 각종 설계 및 인허가 관련 인쇄비, 출장비, 비품구입비, 보험료, "계약상대자"에게 부과되는 제세공과금, 특허․신기술 사용료 등 본 과업수행에 필요한 일체의 비용이 포함된 것으로 간주한다.

1.6.2	실비계상 항목은 실 투입된 수량에 따른 비용으로 계약금액 범위 내에서 실비 정산한다.

1.6.3	"계약상대자"는 본 용역의 과업 내용 중 이행하지 않은 계약부분, 용역비 산정 내역서상 착오 발생 또는 동 사유로 외부기관에 의한 감사 등의 결과로 감액처분지시가 있을 경우, 용역수행기간 중 또는 완료 후라도 "계약상대자"에게 감액 또는 환불요구를 할 수 있으며, 이 경우 "계약상대자"는 정당한 사유가 있을 경우 즉시 소명하여야 하며, 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

1.6.4	전항에 의한 감액 또는 환불 해당금액은 "계약상대자"에게 지불하여야 할 금액 중에서 상계할 수 있으며, 상계할 지불금액이 없을 경우에 "계약상대자"는 "공사"가 정한 기일까지 환불하여야 한다.

1.6.5	“계약상대자”는 본 용역을 수행함에 있어 대한민국 이외의 조세당국이 “계약상대자”에게 부과하는 모든 세금, 관세, 수수료, 수입세, 물품세, 소비세 및 기타의 제세공과금을 전적으로 부담한다.

1.6.6	대한민국의 관련법령에 따라 관계 세무당국 또는 지방자치단체에 의해 "계약상대자" 및 "계약상대자"에 의해 고용된 자에게 부과되는 일체의 개인소득세, 독점판매세(Franchise taxes), 법인세, 급여세(Payroll taxes), 부가가치세 및 사회보장세 또는 유사한 부과금 등은 계약상대자가 부담한다.

1.6.7  "계약상대자"는 국가의 세금 관련 모든 법령, 규칙과 규정상의 법적 및 회계 요건을 철저히 준수하여야 하며, 위와 같은 요건과 책임을 준수 및 이행하지 못함으로써 부과되는 모든 벌과금, 가산이자 및 가산세에 대하여 책임을 진다.

1.6.8	기성대가의 지급은 계약예규 용역계약 일반조건을 따르되, "공사"의 승인을 받은 진도율에 따라 지급함을 원칙으로 하고, 기타사항은 별도 협의 및 "공사"의 관련 규정에 따라 지급한다.

1.6.9	제3장의 추가 과업 내용과 자문비 등 직접경비의 집행은 "공사"와 사전협의한 후 승인을 거쳐 시행하며, 해당 용역비에 대하여는 실 투입된 수량에 따른 비용으로 정산한다.

1.7	계약변경

1.7.1	“공사” 및 “계약상대자”는 용역계약조건 또는 다음과 같은 사유가 발생할 경우 사전에 서면으로 상대방에게 통지하고 합의하여 계약을 변경할 수 있다. 계약변경으로 계약금액의 증감이 발생할 경우에는 관계법규 및 상호간에 협의를 통하여 결정한다.

가.	관계법규 변경 또는 특례조항 설정으로 계약내용의 변경이 필요한 경우

나.	"공사"의 요청에 따른 사업 및 과업범위가 조정․변경 된 경우로 단, 연면적 ±10%이내의 조정은 변경으로 불인정

다.	과업기간 변경 등의 사유가 발생한 경우(계약상대자 귀책으로 인한 업무 지연의 경우 제외)

라.	직접경비 및 실비 계상법에 의한 비용의 정산 시 증감이 발생한 경우

마.	기타 “공사”와 “계약상대자”가 필요하다고 상호 인정하는 사항

바.  계약상대자가 다음 각 호에 해당되는 사실이 발생되었을 때 당해부분에 대한 계약이행 전에 "공사"에게 서면으로 이를 통지한 경우

1) 용역내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 사항이 있을 때

2) 용역내용이 현황조사 및 자료 분석결과 당초 용역목적과 합치되지 않을 때

사. 자체 또는 외부감사(감사원, 국토교통부 등) 시행결과 지적된 경우

아. 계약이행 수량의 정산변경이 필요한 경우

1.7.2	과업수행과정에서 “공사”의 계획변경이나 주변여건 변화로 인하여 용역의 일부 또는 전부의 시행을 중지할 필요가 있는 경우 “공사”는 용역의 중지를 요청할 수 있으며 이로 인한 계약금액은 관련 법규 및 계약서를 기준으로 조정한다.

1.7.3	“계약상대자”는 필요시 계약내용 변경 시 용역수행 투입인력 및 기술지원, 용역일정 등 용역업무수행을 위한 검토사항을 “공사”에 제출해야 한다.

1.7.4	“계약상대자”는 계약변경에 따른 분쟁이 발생할 경우, 분쟁이 된 부분이 전체 용역수행에 영향을 주어서는 아니 된다.

1.7.5	“계약상대자”는 계약변경에 따른 과업범위, 인력조정, 용역비 또는 추진일정 등의 조정에 관한 이견 또는 분쟁이 있음을 이유로 전체용역의 계속적인 수행에 영향을 주어서는 안된다.

1.8	보안사항

1.8.1	“계약상대자”는 본 용역 수행 시 준수해야 할 보안사항에 대해서 관계법규, 용역계약조건의 관련규정 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다해야 하며, 이의 불이행으로 인하여 발생하는 모든 책임은 “계약상대자”가 부담한다.

1.8.2	“계약상대자”가 본 용역수행 중 타 행정기관 등으로부터 관련자료 제출 등 각종 협조요청을 받았을 때에는 “공사”의 사전 승인을 받은 후 협조에 응해야 한다.

1.8.3	본 용역은 국가 보안목표 ‘가’급 시설인 공항시설에 대한 설계용역이므로 용역관련 조사내용, 중간결과 및 최종결과에 대하여 용역준공 여부를 불문하고 보안을 유지하여야 한다.

1.8.4	“계약상대자”는 본 용역을 수행함에 있어 외국설계사무소 및 외국 인력의 투입이 필요할 시 별도의 보안대책(보안관련 이행각서 등의 제출)을 수립하여야 하며 국내의 기술 및 인천국제공항에 대한 자료가 해외로 유출되지 않도록 보안대책을 수립하여 시행에 만전을 기하여야 한다.

1.8.5	“계약상대자”는 본 용역의 보안을 위하여 아래사항을 준수하여야 한다.

가. 과업수행 중 발생되는 성과품 등 일체의 자료 등의 폐기는 세절 또는 소각 처리하여야 한다.

나. “계약상대자”는 본 용역수행과정에서 “공사”부터 인수받은 용역관련 각종자료 및 용역수행과 관련하여 수집된 중요한 기록, 자료 및 중간 연구결과를 시건장치가 되어 있는 보관함에 보관하여야 하며, 비밀등급으로 분류되어야 할 사항에 대하여는 “공사”와 협의하여 적절한 조치를 하여야 한다.

1.8.6	본 용역을 수행함에 있어 "계약상대자"는 "공사"의 보안업무규정에 따라 보안업무담당자를 지정 운영하여야 하며, 보안업무담당자는 "공사"의 보안업무와 관련된 규정 및 지침에 따라 용역이 수행될 수 있도록 관리하여야 한다.

1.9	설계 성과품 및 저작권 소유

1.9.1	본 용역의 성과품에 대한 저작권 내지 소유권은 모든 성과품 제출시점으로 “공사”에 귀속되며, “계약상대자”는 향후에도 저작권에 대한 권리를 주장할 수 없고, 모든 성과품은 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며, “공사”의 사전 동의 또는 승인 없이 제3자에 제공 및 발표․배포할 수 없다.

1.9.2	본 용역수행에 있어 제3자 권리의 대상으로 되어있는 특허 등의 산업재산권, 신기술 등을 사용할 때는 “계약상대자”가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야한다

1.9.3	“계약상대자”는 용역 완료 후 “공사”가 제공한 모든 자료를 반납 또는 적법하게 폐기해야 한다.

1.9.4	“계약상대자”는 “공사”의 주요재산이 되는 각종 기준서․절차서 및 건설사업과 관련하여 축적된 노하우 등이 외부로 유출되지 않도록 철저히 관리해야 하며, 외부유출로 인하여 “공사”에 손해가 발생하였을 경우에는 “계약상대자”가 배상해야 한다.

1.10	위반행위의 조치 및 분쟁의 해결

1.10.1	“공사”는 “계약상대자”의 다음과 같은 행위로 “공사”의 사업에 차질을 초래 하였을 경우에는 과업의 불이행으로 보고 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

가.	건설기술진흥법 제24조(건설기술자에 대한 업무정지) 및 제53조(건설공사 등의 부실측정)의 각 항에 해당될 경우

나.	용역과정의 불성실한 업무수행(타 설계내용의 복사적용, 설계도서 간의 내용 불일치 등) 및 부적합한 법규․기준적용으로 설계품질이 보증되지 아니할 때

다.	계약기간 내에 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 지연될 때

라.	“공사” 요청사항의 지연․지체처리로 사업에 차질이 발행하였을 때(지체상금 부여 가능)

마.	과업의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 하였을 때

바.	기타 본 용역의 계약내용 이행이 계약서 및 관계법령에 부적합 할 경우

사.	소속직원(하수급자 등 포함)이 보안 관계 법령, 공사 보안 관련 규정, 정보보안 지침 등을 위배하여 보안 사고를 야기한 경우

아.	설계의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급 하였을 때

1.10.2	계약의 수행 중 계약당사자 간에 발생하는 분쟁은 “공사”, “계약상대자” 상호 협의하여 해결한다.

1.10.3	분쟁발생 후 30일 이내에 원만한 협의가 이루어지지 아니할 때에는 관련법령에서 정하는 절차에 의하여 해결하며, “계약상대자”는 분쟁기간 중이라도 용역 수행을 중지하여서는 아니 된다.

1.10.4	"계약상대자"의 귀책으로 인하여 발생되는 제반비용은 "계약상대자"가 부담하여야 하며 "공사"는 대가 지급시 해당 금액을 상계한 후 지급할 수 있다.

1.11	기타사항

1.11.1  계약상대자는 본 용역기간 중 "공사"와 계약상대자 간 또는 관계기관과의 업무 연락이나 과업수행을 위한 시내․외 출장 등을 효율적으로 수행할 수 있도록 협조해야 한다.

1.11.2  설계 오류에 대한 조치

가. 계약상대자는 시공과정에서 예상되는 아래와 같은 현장설계변경 사항에 대해 적극적이고 신속하게 처리해야 한다.

1)	실시설계 완료 후 계약상대자의 귀책사유로 인한 설계도서(도면, 시방서 등)의 오류, 설계누락 사항 처리를 위한 설계변경통보서의 작성

2) 시공계약상대자 및 감리자(사업관리자)가 설계 하자로 인한 현장시공 대안제시 및 설계오류 수정 등의 목적으로 발행하는 현장설계변경 요청사항에 대한 검토․조치

3) 기타 시공과정에서 원설계자가 처리해야 할 사항

1.11.3  해외출장 등

가. "계약상대자"는 본 과업수행의 일환으로 해외 선진공항의 조사 등을 목적으로 필요시 해외출장을 갈 경우에는 해외출장계획을 세워 "공사"의 사전승인을 득하여야 한다. 이때 소요되는 경비는 책정된 계약금액 범위 내에서 관련규정에 의거 집행하되 집행 잔액은 용역수행 완료 시 정산처리 하도록 한다.

나. 외국에서 수행하는 용역이 있을 경우 업무에 대한 진행상황의 확인이나 용역 관련 주요지시 또는 협의사항 등에 대해 현지에서 수행하는 것이 효과적이라고 판단되는 경우에는 "계약상대자"는 "공사" 측의 당해 담당자가 현지에 가서 담당업무를 수행토록 협조하여야 한다.

1.11.4 "계약상대자"는 본 용역기간 중 "공사"와 "계약상대자" 간 또는 관계기관과의 업무연락이나 과업수행을 위한 시내․외 출장 등을 효율적으로 수행할 수 있도록 협조하여야 한다.

		제 2장 과업의 내용

제2장  용역의 내용

2.1	과업의 개요

2.1.1	과 업 명

본 과업의 명칭은  “북측 화물터미널지역 편의지원시설 설계용역”(이하 ‘설계용역이라 한다)이라 한다.

2.1.2	목    적

본 용역은 인천국제공항공사가 시행하는 북측 편의지원시설 신축 사업을 추진함에 있어 시공 및 운영 등에 필요한 설계관련 도서 일체를 작성하고, 인허가 등 관계법령에 따른 제반 행정절차를 이행하기 위한 설계도서를 작성하는데 그 목적이 있다.

2.1.3	과업의 범위

가.	대상사업

연 번	건물명	연면적	동 수	비 고
1	북측 화물터미널지역 편의지원시설	1,000㎡	2동

주1) 부지위치 : 인천광역시 중구 운서동 3246-32번지, 3246-39번지

주2) 시설 규모는 설계과정에서 변경 될 수 있음.

나.	기본적인 과업내용

- 북측 화물터미널지역 편의지원시설 등 해당용역 과업대상의 신축 사업에 필요한 건축, 토목, 기계, 운송설비, 전기, 소방, 통신, 보안 등 이에 부수되는 설계 중 기본설계 및 실시설계의 수행.

- 각종 협의 및 인허가(시행허가 포함)에 필요한 서류작성 및 제출과 제반협의를 포함한 인허가 처리와 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무협조 및 지원

1)	설계 대상 시설의 운영자 요구조건을 반영할 수 있는 신규 시설설계 안 수립(설계사례조사 /설치 대안 제시 및 대안별 장·단점 분석 : 형태 / 동선계획 / 사업비 / 공기 / 외장 / 자재 / 공사 시 임시 시설 등)

2)	설계 대상 시설에 따른 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 방재, 보안, 조경, 승강시설 등과 이에 부수되는 시설의 기본 및 실시설계 설계도서 작성

3) 화물터미널지역과 조화를 이루는 내․외부디자인 반영

4) 건물 내․외부 안내사인물(Signage & Graphics 등)  계획(상업시설 사업자의 사이니지 설치에 대한 가이드라인 작성 포함) 및 발주도서 작성(필요 시)

5) 건물 내․외부 가구집기류 디자인 계획 및 발주도서 작성(필요 시)

6) 분야별 Interface 발굴 및 처리방안 검토

7)	인허가(기본계획변경, 공항개발 사업(시행허가), 실시계획(변경)승인 및 준공 등)관련 업무지원과 이에 따른 도서 작성 : 인․허가 서류 작성, 준공 지원(건축물관리대장 작성 등) 및 행정수속 등의 제반업무

8)	법적 기준에 따라 필요성을 검토 후 필요시 “공사”와 협의하여 친환경건축 관련 설계업무 및 인증 취득

9)	본 사업에 추진에 따른 사전환경성검토, 환경영향평가 및 교통영향분석 ․ 개선대책 방안 검토(필요시)

10) 유지관리지침서 작성

11) 조감도 및 투시도 작성

12) 기본 및 실시설계 진행과정에 요구되는 각종 검토서, Issue Paper 등의 작성 및 제출

13)	기타 과업내용서에서 정하는 업무

14) 과업 종료 후 사후 설계관리 업무 협조

<기타 사항>

◾ 가구집기류, 경계시설물, 안내표시 Signage, 외부시설물, 대테러방지시설물 등을 포함한 구획지역 내 모든 시설의 설계를 포함한다.

◾ 각종 유틸리티라인의 경우에 있어 과업의 범위는 각 유틸리티 라인의 분기점에서부터 시설 내부까지이며, 자료를 검토한 결과 범위의 조정이 필요한 경우에는 사전에 "공사“와 협의 조정한다.

◾ 유틸리티 공급시설인 경우에는 기존 매립배관에서 분기하여 본 시설로 인입배관 설계 및 기존 유틸리티 시설의 영향도 검토해야 한다.

◾ 설계공모 심사위원, 자문위원 등의 지적사항에 대해 반영(조치) 후 결과 보고(제출)한다.

◾ 설계도서는 공사 시행사가 명확하게 이해할 수 있도록 변경 전․후 도면을 작성하여 기존부분과 변경할 부분, 철거부위와 신설 부위 등을 쉽게 이해할 수 잇도록 작성하여야 한다. 아울러, 기존 대비 개선되는 사항들을 구체적으로 정리하여 개선의 효과를 알기 쉽게 제시하여야 한다.

◾ 사업추진과 관련한 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무를

지원 협조한다.

다.	본 과업수행에 따른 추가업무내용은 “공사”와 “계약상대자”가 상호 협의한 사항에 한하며, “계약상대자”는 추가업무수행에 따르는 소요비용을 “공사”와 사전 협의하여야 한다.

2.1.4	과업의 수행기간

가.	본 용역의 과업수행기간은 계약일로부터 6개월로 하며, 설계기간 중 “계약상대자”는 “공사”에서 시행중인 사업추진 일정에 따라 해당 설계도서를 제출하여야 한다.

1)	설계도서(Rev.A) 및 인허가용 설계도서 제출 : 계약일로부터 4개월 이내

2)	최종 설계도서(Rev.0) 제출 : 계약기간 내

3)	공사 중 설계변경 지원 및 현장설계변경 도서작성 지원 과업 포함

나.	설계도서 제출과 관련한 세부 일정은 “공사”와 협의 후 시행하여야 하며, 사업추진 공정계획에 차질이 없는 범위 내에서 일부 조정할 수 있다.

다.  본 과업완료 후라도 본 과업과 관련한 각종 협의업무 및 자료의 제출이 필요한 경우와 과업내용의 미비 및 하자로 인한 변경이 필요한 경우에 동 내용을 완료 할 때까지 과업을 수행해야 한다.

라.	“계약상대자”는 다음과 같은 사정으로 과업수행기간 연장사유가 발생한 경우에는 즉시 “공사”에 서면으로 계약기간의 변경을 요청하여야 한다.

1)	천재지변, 전쟁 등 불가항력의 사태가 발생한 경우

2)	관계기관 협의 및 검토 지연으로 계약기간의 변경이 불가피할 때

3)	“계약상대자”에게 돌발적인 사태가 발생하여 계획공정 준수가 불가능한 경우

4)	기타 “공사”의 사업계획변경 (과업중단, 과업내용의 일반적 범위 밖의 증가) 등으로 당초 계획공정의 준수가 불가능한 경우

2.1.5	주요업무의 사전승인

가.	“계약상대자”는 다음 사항에 대하여 사전에 “공사”의 승인을 득한 후 업무를 수행하여야 한다.

1)	계약내용을 변경하는 경우

2)	관계기관 및 인․허가기관, 이해당사자의 의견, 협의사항과 대외 자문 내용을 반영하고자 하는 경우

3)	사업비, 설계품질 및 공정에 중대한 영향을 미치는 사항

4)	기타 과업내용서에 따로 정한 사항 및 “공사”의 요청이나 “계약상대자”의 판단에 따라 사전에 승인을 받아야 하는 사항

2.2	과업의 착수

2.2.1 착수보고회 개최

가.  계약상대자는 계약일로 부터 7일 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부한 착수신고서를 "공사"에 제출하고 과업에 착수해야 하며 착수보고회는 "공사"와 협의하여 시행한다.

1) 사업책임기술자 선임계

2) 예정공정표

3) 용역비 내역서

4) 기타 용역수행에 필요한 사항

나.  착수보고회 보고내용은 용역개요, 추진방향, 조직, 일정, 품질․공정관리계획 등 용역수행을 위한 구체적이고 객관적인 내용이 포함되어야 한다.

2.2.2	과업수행계획서 제출

가.	“계약상대자”는 설계의 품질확보, 경제성 제고 및 효율적 용역수행을 위하여 설계 및 시방기준, 관련법령 등에 적합한 과업수행계획서를 용역계약 체결 후 20일 이내에 “공사”와 사전에 협의하여 제출해야 한다.

나.	과업수행계획서는 다음사항이 포함되어야 한다.

1)	종합 공정계획 및 분야별 세부공정계획(단계별 설계도서 작성 및 성과물 제출계획)

2)	용역책임기술자 선임신고서

3)	참여기술자의 투입계획(인적사항, 업무내용, 참여기간 등)

4)	과업수행 조직표 및 참여업체 통합운용계획, 비상연락체계

5)	건설기술 경력사항확인서(회사, 책임기술자급)

6)	국내외 협력사/공동수급체(해당되는 경우)간의 세부업무분장 및 용역비 배분내용

7)	인·허가 계획

8)  보안관련 서류

9)	기타 “공사”에서 요청하는 내용

2.2.3	사업책임기술자는 특별한 경우를 제외하고, 해당분야 자격증(기술사 또는 건축사) 소지자로 지정을 원칙으로 하며, 분야별 책임기술자는 관련 분야에 학식과 경험이 풍부한 전문 인력을 지정하며 설계업무를 주도적으로 수행해야 한다.

2.3	공정보고 및 업무회의 등

2.3.1	공정보고

가.	(월간보고) “계약상대자”는 과업수행기간 중 다음 사항을 포함한 월간 공정보고를 매월 5일까지 “공사”에 제출하여야 한다.

1)	분야별 추진실적 및 공정현황 (지연시 만회대책)

2)	각종 도서 수발현황 (승인사항 포함) 및 조치현황

3)	참여기술자 투입현황	4)	과업 수행 중 문제점 및 대책

5)	관계기관 등과의 협의․자문 및 인허가 등의 행정사항 추진현황

6)	다음 월의 추진계획 등

나.	(주간보고) “계약상대자”는 주간업무 추진실적 및 추진계획과 현안사항을 매주 목요일까지 “공사”에 제출하여야 한다.

다.	(중간보고) “계약상대자”는 “공사”의 요청(구두 및 서면 포함)이 있거나, 다음의 경우에는 즉시 보고(관련 자료 제출 포함)하여야 한다.

1)	주요 단계별 과업 및 주요 공종이 종료되었을 때

2)	주요 계획 및 방침의 수립 및 변경 시

3)	“공사”의 본 사업과 관련한 별도 발주대상 사업의 설정 등 필요사항

2.3.2	업무회의

가.	“공사”는 설계용역을 수행하는 과정에서 발생되는 문제점과 설계의 인터페이스 해결을 목적으로 설계용역 회의 개최 및 참여를 요청할 수 있다.

나.	“계약상대자”는 회의진행에 필요한 관련 자료를 작성하여 “공사”에 제공하여야 하며, “계약상대자”는 회의 안건에 대한 처리결과를 “공사”에 제출하여야 한다.

2.3.3	기타사항

가.	“계약상대자”는 분야별로 주요 검토 사항은 성과물과 관계없이 Issue Paper로 제출하여야 하며, 필요시 “공사” 또는 외부 전문가의 검토를 받아야 한다.

나.	“공사”는 과업 추진정도에 따라 “계약상대자”의 진도 보고 방법과 일정을 조정할 수 있다.

다.	“계약상대자”는 각종 보고, 회의 및 Issue Paper 등의 자료를 기록, 관리 및 보관하여야 한다.

2.4	성과물제출

2.4.1	“계약상대자”는 설계 단계별 성과품을  “용역성과품 작성 및 납품“에 따라 적기에 제출하여야 하며, 필요에 따라 ”공사“와 협의하여 진행단계 및 수량 등을 조정할 수 있다.

2.4.2	“계약상대자”는 “공사”의 시공발주 계획에 따라 별도의 시공 발주용 설계도서를 작성, 제출하여야 한다.

2.5	관련법규 및 기준

2.5.1	설계용역수행에 있어 다음의 관련법과 기준 등을 준수하고, 관련법규 적용여부 등을 검토하여 검토보고서를 제출해야 한다.

가.	공항시설법 등의 공항 · 항공관련법규

나.	경제자유구역법, 자유무역지역법 등 지역 개발 관련법규

다.	건축법, 건축사법 등의 건축 관련법규

라.	건설기술진흥법, 건설산업기본법, 엔지니어링산업진흥법

마.	국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 수도권 정비계획 법규

바.	도로, 철도 및 주차장 관련 법규

사.	건축물 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 등 소방관련법, 가스관련법과 하수도법 등 상하수도관련법, 폐기물관리법, 건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률, 환경정책기본법, 환경영향평가법, 공항소음방지 및 소음대책지역지원에 관한 법률, 수질환경보전법, 대기환경보전법, 다중이용시설 등의 실내공기질관리법, 범죄예방 건축기준 고시 등 안전 및 환경 관련 법규

아.	공항소음방지 및 소음대책지역지원에 관한법률 등 환경관련 법규 및 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지 개발이용보급촉진법

자.	중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법령, 친환경상품 구매 촉진에 관한 법령 등 공공구매 관련 법령

차.	전기 및 정보통신 관련법규

카.	건축전기설비 설계기준

타.	소프트웨어 산업진흥 관련 법규

파.	시설물의 안전관리에 관한 특별법, 산업안전 관련법규

하.	기본설계 등에 관한 세부시행기준 등의 제 기준

갸.	개인정보 보호 관련 법규

냐.	건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 등에 제 규칙

댜.	관련 지방자치단체의 조례 규정, 규칙, 고시

랴.	기타 고시, 규정, KS기준, 표준, 전문시방서 등

먀.	기계시설법 등의 기계 관련 법규

뱌.	전기 및 정보통신 관련법규

샤.	관련 지방자치단체의 조례 규정, 규칙, 고시

쟈.	건축물의설비기준등에관한규칙 등의 제 규칙

챠.	장애인노인임산부등의 편의증진보장에 관한 법

캬.	기타 본 용역 및 공사시행을 위한 관련 법규

탸.	승강기 시설 안전관리법 등 기타 승강기 관련 법령

2.5.2	“공사”의 절차, 기준 등 적용

가. 설계관리절차서 등 "공사"의 각종 절차서, 기준 및 지침

나. 공항설계기준서, 공항시설 전문시방서, 표준화공법서 등

다. 인천국제공항 시공 관련 지침

라. 기타 관련 절차, 기준 및 지침

		제 2장 과업의 내용

		제 3장 설계 세부지침

제3장  설계 세부지침

3.1 설계 일반지침

3.1.1 계약상대자는 국내·외 우수하게 운영중인 편의지원시설 등을 조사․분석하여 현 과업만의 특색있고 차별화되는 새로운 설계(안)을 수립하여 이를 "공사"에 제안하여야 한다.

3.1.2	계약상대자는 "공사"의 확보된 예산범위 내에서 설계해야 한다. 공사비 산출에 따른 공사비가 공사의 예산을 초과할 경우 전체 기능에 영향을 주지 않는 범위 내에서 대안을 작성하여 공사의 사전검토 및 승인을 득한 후 결정된 방안에 적합하도록 설계해야 한다.

3.1.3	계약상대자는 과업 수행과 관련한 각종 방안 및 설계 적용기준 등은 "공사"의 사전검토 및 승인을 득한 후 다음 단계의 설계를 수행해야 한다.

3.1.4	모든 시설은 기능의 충족, 에너지절약, 건설 및 운영비용 절감 방안 등을 최우선으로 하여 계획해야 한다.

3.1.5	계약상대자는 공항시설의 설계 및 건설, 운영에 관계되는 관련 최신의 국내․외 규정 및 권고사항, 설계기준 등에 의거 설계를 수행해야 한다.

3.1.6 현황조사 및 현장답사

가. "공사"가 제공한 관련 도서 및 자료 및 현장 조사(인천국제공항 화물터미널지역) 등을 통하여 현황을 파악한다.

나.  계약상대자는 인천공항의 안정적인 운영에 지장 없이 본 사업이 적기에 추진 되도록 과업수행에 필요한 현황조사를 면밀히 수행한다.

다.	기존시설에 대한 답사를 통해 설계와 관련된 주요 시설의 운영현황 및 특성에 대한 조사 계획을 작성 후 "공사"의 승인을 받고, 모니터링 및 현장조사를 실시하여 검토․분석된 내용은 "공사"와 협의하여 설계에 반영한다. 특히, 운영과정에서 발생한 경험 및 개선 요구사항을 검토한 후 이에 대한 설계 반영 여부를 "공사"와 협의하여 진행한다.

라.	공항운영자(상주기관, 협력사 및 입주업체 등) 당해 시설 입주 예정인 유관기관 및 업체, "공사" 관련부서의 의견을 조사하고 이를 검토, 설계에 반영하되, 향후 이견이 예상되는 사항에 대하여는 "공사" 및 관계자와의 협의를 통해서 진행된다.

마.	관련법에 따른 측량을 실시하고 그 결과물을 "공사"에 제출한다.

3.1.7 기존 운영 시설 및 시스템의 지장장애물(유․무형) 조사

가.  대상 시설의 설계 및 건설공사 시행에 영향을 미칠 수 있는 현재 운영 중인 각종 지상의 유․무형의 장애물을 분야별로 조사하고 대책을 수립한다.

나.  대상 건축물의 각 공종별(건축,기계,소방,전력,통신,보안 등)의 시설 및 시스템 현황을 검토하여 각종 간섭사항의 사전 조치 등 향후 공사 시 예상되는 각종 문제점들을 충분히 고려하여 설계하여야 한다.

다.   공항운영에 지장 및 장애가 없도록 계획 및 대책을 수립하여야 한다.

라.  공사로 인한 불편 및 운영에 미치는 영향이 최소화 되도록 임시시설, 가설, 자재 및 폐기물 반출입, 양중계획 등을 시설계획에 포함하여 설계하여야 한다.

3.1.8	사용하는 모든 재료는 다음 사항이 충족되도록 설계한다.

가.  공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서 규정에 적합한 것으로 경제성(LCC고려), 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경 등을 고려하여 적정재료를 선정하고, 수급 안정성을 위하여 모든 재료는 국산제품 적용을 원칙으로 한다.

나.  위 사항을 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 "공사"의 승인을 받아야 하며, 설계서에 KS, 각종 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서 및 설계도면에 명시한다.

다.  특정제품(공법, 기술)을 사용하고자 하는 경우에는 그 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리 상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 자문 또는 기술 검토를 통하여 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 공사의 승인을 득한 후 설계에 반영하며, 특정 업체에 특혜를 제공하지 않도록 주의한다.

라.  정부기관(국토교통부, 산업통상자원부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증제품 중 본 과업 특성에 맞는 것은 검토한 후 공사의 승인을 맡아 적용한다.

마.	사용하는 자재는 “녹색제품 구매촉진에 관한 법률” 및 “녹색제품 구매지침”(환경부)에 따라 친환경인증자재(환경마크 인증제품) 우선 사용을 고려하고, 적용 시에는 설계서에 친환경 인증자재임을 표기한다.

바.  건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시한다.

사.	계약상대자는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조에 따른 공사용 자재 직접구매 대상품목에 대한 적용여부를 검토하고 설계 및 성과물 작성에 반영한다.

아. 지급자재와 사급자재는 명확히 구분하여 검토하며, 이를 발주용 성과물에 반영하여야 한다.

자. 모든 설계는 시공성, 시의성 등을 감안하여 실현 가능성이 있도록 계획해야 하며, 특히 자재수급의 어려움으로 공기에 영향을 받거나 민원이 발생하지 않도록 자재선정에 있어 합리성과 공정성 준수를 기본으로 하여야 한다.

3.2	건축분야

3.2.1	건축계획

가.	공사내용 및 운영사항을 면밀히 검토하여 다음사항이 충족되도록 설계되어야 한다.

1) 기능 및 보안의 충족              2) 창 의 성

3) 토지이용의 적정성                4) 미학적 우수성

5) 구조계획의 합리성                6) 시설이용 및 동선의 편의성

7) 기존시설 및 주위환경과의 조화    8) 에너지이용의 효율성

9) 증개축 및 유지보수의 편리성     10) 공간이용의 효율성

11) 공사 중 이용객의 불편최소화 및 공사용 동선계획(가설계획 포함)

12) 유틸리티(전기, 급수, 배수, 중․온수, 통신, 주차관제 등) 공급 적정성

13) 에너지절약을 위한 자연환기/채광의 충분한 고려

14) 교통약자의 이용 편의성

15) 실내공기질관리 및 감염병 예방

16) 지역 내 화물차량 동선을 고려한 배치계획

나.	건물내부 계획은 관련법규 및 규제에 따라 화재 혹은 기타 비상시 인원이 안전하고 신속하게 건물외부로 대피할 수 있도록 설계하여야 한다.

다.	유아, 장애인 및 노약자 등을 위한 국내, 외 관련법 및 설치기준에 적합하도록 UD(Universal Design)개념 을 검토하여 설계에 반영

라.	모든 사인물 및 환경디자인 요소는 주변시설과 조화를 이룰 수 있도록 사전에 “공사”의 관련부서와 협의하여 설계 진행

마.	건물을 구성하는 모든 건축재료(내․외부 마감재 등), 구조 부재, 장비 및 기기는 유지관리가 용이하고 내구성이 우수하여야 하며, 지역여건을 감안하여 해양기후에 적합한 내식성이 강하고, 친환경적인 것으로 선정하여 설계에 반영. 특히 해안 매립층에 위치하므로 철골조뿐만 아니라 철근콘크리트조에서도 염화물에 대한 내구성 확보

바.	설계시 LCC(Life Cycle Cost)분석을 수행하여 준공이후 유지관리비 절감방안 마련

사.	가설 휀스의 외부 디자인 요소는 “공사”의 가이드라인을 검토하여 설계에 반영

아.	지붕 및 지하구조물의 방수 설계는 건물의 기능 및 환경에 적합한 방수공법으로 설계하여야 한다.

자.  본 건물은 대형차량 이동량이 많은 화물터미널지역 내 위치함에 따라 배치계획 시 동 사항을 면밀히 검토하여 건물 신축으로 인한 지역 내 차량 혼잡 등의 문제를 최소화

차.  일반음식점, 카페, 편의점 등 추후 임대예정공간은 아래 기본시설에 한정하여 설계

* 기본시설 정의

◾ 건축마감

- 벽체 : 방화성능을 요구하는 벽체를 포함하여 각 시설 간을 구획하는 모든 벽체와 지역에 면하는 개구부의 외부 마감 및 창호

- 바닥·천장 : 영업시설을 구획하는 전면 창호 또는 개방형일 경우 재료분리대까지의 외부 천장 및 바닥 마감

◾  기계설비

- 공조설비 : 실내부까지의 메인 덕트(S/A, R/A, E/A)

- 급수․급탕 : 실내부까지의 메인 배관

- 배수 : 실 하부의 메인 배관

- 가스 : 정압실 및 메인 가스 배관

◾  전기설비 : 1차측 주 차단기(일반전력용, 비상전력용)를 포함한 차단기함(Break Box). 단, 차단기함이 설치되어 있지 않은 장소에서 신설되는 입주자용 전기공급시설은 2차측 차단기로부터 입주자 부담

◾  소방설비

- 감지기 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 9조 및 화재안전기준에 의한 연기식 아날로그 감지기

- 스프링클러설비, 옥내소화전, 제연설비(덕트 등)

◾  통신설비

- 통신선로 : 통신 1차측 단자함(분배설비)까지의 통신선로

- 통신단말 : 공사 기본시설로 설치된 스피커 및 ATT

카.	외부 오픈스페이스에는 흡연실 등 조경공간 및 특화 휴게공간을 필수적으로 조성하여 이용객의 편의성을 향상시키도록 계획

타.	휴게실 등에 방문자의 업무편의를 위하여 Mobile 업무환경을 조성하도록 계획

3.2.2  구조분야

가.	건물구조는 관련법규에 명시된 내진 설계기준 등을 토대로 안전성․내구성 ․경제성 및 구조미 등 합리적인 방식으로 설계

나.  구조설계 시 구조기준, 구조재료와 부재의 형상을 결정하기 위한 대안을 제시하여 그 구조 계산근거 및 각각의 시공성, 경제성 등을 비교하여 "공사"와 협의 후 설계에 반영해야 한다.

다.  각 구조의 부재는 시공성과 경제성 등을 감안하여 가능한 치수별, 재료별 종류를 최소화하고 국내에서 수급이 용이하도록 계획

라.	가설구조물에 대한 구조 안전성 검토

마.	사인물 설치 위치 및 풍압에 대한 충분한 검토를 거쳐 구조재 및 마감재 취부방법 등을 결정

바.	각종 유틸리티 수용 등을 위한 공동구가 설치되는 경우에는 향후 시설확장 검토, 방수, 결로, 소방, 환기, 부등침하 등 구조적 사항에 대하여 충분히 검토한 후 설계

3.2.3 안전관리 분야

가.  공사 시행으로 인한 운영 불편 및 안전성 저하을 최소화 되도록 임시시설, 가설, 자재 및 폐기물 반출 입, 양중계획(유틸리티시설 포함) 등 별도의 시설계획을 설계에 반영하여야 한다.

나.  해당 사업의 공사 시 운영 중 지역임을 고려하여 공사구역과 화물터미널 운영구역의 철저한 구분 및 안전한 공항 이용 환경을 확보할 수 있는 방안을 마련하여야 한다.

3.2.4  친환경 및 에너지 건축 설계 분야

가.   친환경 인증자재 및 재료 활용, 친환경 공법 적용을 고려해야 한다.

나.  설계 완료 전 친환경 건축설계와 관련된 법, 규정 또는 지침이 개정되는 경우 개정된 내용을 반영해야 한다.

다.	LED조명으로 설치비율은 100%를 적용하되, 기능 및 규격이 설치목적에 미달되는 경우엔 일반 조명으로 설치적용

라.  온실가스 배출권 거래제 시행으로 인해 신・증설시설에 대해 온실가스 배출권 추가할당을 위해 중온수 및 전력 측정을 위한 계량기(정밀도 0.5급)를 설치하여야 하며, 원격으로 사용량을 확인할 수 있도록 구성(환경부 고시 제2021-277호)

마.	에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무), 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한규정(산업통상자원부 고시) 및 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 의하여 고효율기자재 사용을 계획

3.3	토목 분야

3.3.1	기초분야

가.	기초공법 선정 시에는 지반조사를 시행하여 안정성, 경제성, 시공성 등을 종합적으로 검토하여 적정 공법을 선정 후 기초 공사비 산정

나.	사업부지내의 시공시 되메우기 등은 우리 공사 전문시방서상 토목시방기준 등 관련규정에 적합하게 설계하여야 하며, 외부 진입도로 등의 접속점 등에 대하여 주변시설과 간섭사항이 발생되지 않도록 충분히 검토하여 설계

3.3.2	측량 및 지반 조사

가.	측량은 측량법과 공공측량의 작업규정 세부기준에 의거 시행

나.	대지경계측량 및 실측은 정밀측량을 실시하고 부지면적과 정확한 현황을 도면으로 작성하고 측량보고서를 “공사”에 제출

다.	주변지역의 지하시설물 현황(노선, 매설깊이 등등)을 면밀히 조사하여 간섭사항이 발생하지 않도록 설계에 반영

3.3.3	오수 관로시설

가.	관로 구성시 기 설치된 관로를 최대한 활용할 수 있는 방안을 강구하여야 하며, 오수 (잡배수 포함) 발생지역에서 배출되는 오배수를 효율적으로 차집, 처리할 수 있도록 오수관로 노선을 면밀히 검토하여 결정

나.	발생오수는 전량 차집이 될 수 있도록 계획하며, 오수관거에 대한 기존 매설관거를 충분히 검토 후 관거의 개보수 및 신설계획을 수립하고, 지선관로 연결계획도 용이하게 될 수 있도록 설계

다.	오수 배출원에서 부터 오수관로에 설치할 배수설비의 연결지점을 선정하여 도면에 표기

라.	계획하수량 및 지하수 유입량을 결정하고 관종, 관경, 구배 등을 설계

3.3.4	우(배)수 관로시설

가.	배수계획은 시설부지 경제적이고 합리적인 재현기간을 설정, 설계홍수량을 산정하고 배수로 단면결정, 구조계산과정에 따라 설계

나.	설치되는 도수로 등은 미관, 유지보수, 경제성 등을 고려하여 Open형 또는 매립형 등을 검토하여 설계

다.	인접건물의 우수 배제방안을 사전 검토하여, 건물에서 집수되는 우수는 노면으로의 방출을 억제하고, 인접한 우수관로에 접속하여 배수

라.	포장하부의 배수로(차집관로)는 조인트 부에서 누수가 발생되지 않는 방수공법을 선정하여 설계하고, 초기강우 처리에 필요한 시설을 설계

마.	건물 및 구조물에 인접한 맨홀과 관로는 시공시 접속단차, 선형, 구배시공을 고려하여 설계

바.	설계도면의 작성

1)	배수로를 토공 횡단도에서 표시하는 경우는 배수로 토공계획만 표시하고 배수로 종, 횡단도면은 별도 작성

2)	배수처리계획 평면도 작성 시 별도 지하구조물과의 관련성을 종합도면을 통해 충분히 검토하여야 하며 배수처리계획 평면도에는 별도 인접 지하구조물 계획을 삽입하여 공사 계획 수립에 참고할 수 있도록 작성

3.3.5	포장시설

가.	도로설계 관련 법규 및 지침을 기준으로 설계

나.	설계 전 시행한 각종 조사자료(측량, 지장물 현황, 지반조사, 기타 등등)를 반영하여 설계

다.	도로포장의 공법 및 구조는 경제성 및 유지보수 측면 등을 비교 검토한 후 결정

라.	도로표준단면 결정

1)	단위 차선폭을 검토․계획

2)	차선, 보도, 측대 등의 폭원을 검토․계획

마.	지반조사 결과 연약지반 개량 필요부분이 있는 경우 시설물 준공일정을 감안한 최적의 설계가 될 수 있도록 조치하여야 하며, 공법 결정 등은 사전 “공사”와 협의

바.	포장설계는 관련기준에 합리적이고 경제적인 포장설계 계획

사.	포장지역에 설치되는 구조물(공급관로 포함)의 설치계획 및 구조물과 포장간 침하관계, 시공관계 등이 종합적으로 검토되어 설계

3.3.6	부대시설

가.	부대 시설물은 주변 시설과 조화를 이루어야 하며, 도로구조가 허용하는 한 이용객의 편의가 우선되도록 설계

나.	교통안전시설 및 교통관리시설은 관련법령 및 기준/지침/규정 등 관련내용을 반영하여 설계하고 교통규제심의를 거쳐 최종 확정

다.	건물 주변에 기 조성된 주차장 배치 및 도로의 통행방법 등은 2016년 시행한 “북측화물터미널 교통환경개선 용역/공사 및 기타자료”등을 확인하여 본 건축물 주변 주차장 및 도로통행 방법(라인마킹, 표지판 등) 등을 설계하여야 한다.

3.3.7	조경분야

가.	대상지의 특성과 주변 환경을 고려하여 내·외부 공간의 조경설계 목표를 설정하여 설계하며 관련 법규에 충족하는 조경면적 확보

나.	조경설계기준, 조경표준품셈 등 관련 규정에 적합하도록 설계

다.	대상지의 기후 및 임해매립지 준설모래 기반의 식재기반 특성을 고려하여 토양 단면과 토양의 물리적 특성을 고려하여 장기적인 식생 환경을 조성

라.	부대건물 건설로 인하여 발생하는 기존 부지의 수목에 대한 간섭사항 발생 시 대상 수종, 규격, 수량 등 현장 조사를 통하여 정확하게 파악하여 설계에 반영

마.	이식 대상 수목에 대한 식재지역 및 운반거리 등은 공사 담당자와 협의 후 설계 반영

바.	조경시설물의 설계는 주변 환경 및 경관과 조화될 수 있고 조경설계기준 및 관련 규정에 적합하도록 공사와 협의를 거쳐 설계 진행

사.	시설배치, 자재, 공법의 선택, 규격 결정 등 시공 및 유지관리 시 효율성을 고려한 계획 수립

3.4	기계설비 /전기 / 통신/ 보안 / 기타 분야

3.4.1	기계 설비 분야

가.	기계설비는 다음을 고려하여 설계

1)	기계설비의 성능보장

2)	설비 시스템의 단순화 및 운영, 보수, 확장이 용이한 시스템 구성

3)	설비자동화로 운영비 절감이 가능한 설계 및 에너지 절감을 고려한   최적설계

4)	Life cycle cost개념에 기초하여 초기 투자비 및 유지관리비 최소화

5)	향후 기술개발에 유연하게 대처할 수 있는 시스템 구성

6)	지하 구조물은 완전 방수형으로 설계하고, 비상시를 대비하여 지하구조 내 배수로를 설치하고, 자연유하가 어려운 지역은 배수펌프시설을 설치하되 충분한 용량의 집수정 및 펌프시설로 설계

7)	건물 내 수도 등 유틸리티 사용용량 등을 고려하여 인입배관 등을 설계

나.	기계실은 최적위치 확보로 유지보수 용이 및 배관, 덕트동선 최소화, 추후 증설을 고려한 샤프트 면적확보, 장비Pad, 장비반입구 및 연도배기효율 향상 등 효율적으로 계획 설계

다.	공조설비 및 환기설비는 기능별, 구역별로 효율적인 동시에 경제적인 냉․난방 공기조화를 검토하여 설계하되 에너지 절약, 환경관리, 인력절감 등의 종합적인 설비운용이 가능하도록 설계

라.	시수 등 유틸리티 설계시 인입위치 및 공급가능 용량 등을 검토하여 설계

마.	방화구획을 철저히 검토하여 덕트, 배관 등이 통과하는 관통부에는 방화 담파설치 및 방화실란트 등 기타 불연 재료로 마감

바.	시설물의 확장, 용도변경, 구획변경 및 증설 등에 용이하게 대처할 수 있도록 설계

사.	소방관련법규를 검토, 숙지하고 건축평면에 부합되도록 적합한 소방설비를 구축, 특히 배연과 피난을 고려하고, 공조시스템과 연계성을 검토하여 설계에 반영

아.	상업시설 운영자 설비 설치 용량 등을 검토하여 설계에 반영

자. 오수(화장실 잡배수, 구내식당 배수)는 옥외 오수맨홀에 연결하고, 우수 및 지하수(영구배수)는 우수맨홀에 연결하여 설계

3.4.2	전기 분야

가.  전기설비는 현장여건을 고려하여 합리적, 경제적으로 설계하되, 건물 규모 및 기능 유지를 위한 소요 전력량을 우선 산출하고, 적합한 수전방안 검토해야 한다.

나.  수전설비는 계획된 부하시설 외에도 향후 증가되는 부하를 감안하여 충분한 용량 및 회로를 설계에 반영하고, 수전설비 설치에 따라 변경이 수반되는 타 건물 내 제반사항에 대한 설계를 포함해야 한다.

다.  조명설비는 실별 배치계획에 따른 기능별 조명기구를 선정하되, 이용자의 시각적 요소 및 에너지 효율(고효율 기자재, LED등을 고려한 에너지절약형)을 고려하고, 유지보수가 용이한 방식으로 적용해야 한다.

라.  케이블, 전등 및 전열 등 모든 전기설비는 이용자로 하여금 사용이 편리 하도록 적합하게 설계, 또한 이용자에게 위해가 되지 않도록 안정성 고려해야 한다.

마.  감전 및 낙뢰 보호를 위한 접지 및 피뢰설비를 설계하되, 서지유입에 대비한 보호기기를 검토하여 설계에 반영해야 한다.

바.  정전발생에 대비하여 안정적으로 전력을 공급할 수 있도록 수전계통을 구성하되, 수전설비의 효율적 감시 및 제어를 위한 전력원격감시제어시스템(SCADA)를 구축하고, 상위시스템(SCADA)에 연계하여 아울러 주요 부하를 고려한 비상전원 설비 적정용량을 산정하여 설계에 반영해야 한다.

사.  건축평면 계획 시 전기설비 관련실 배치 및 면적의 유지 보수성 및 향후 확장성을 고려한 충분한 면적, 적정위치, 유효높이, 바닥 하중, 장비반입 경로를 반영해야 하며, EPS실은 층간 수직 배치하여 배선시공 및 관리가 용이하도록 설계에 반영해야 한다.

아.  건축화 조명 적용 시 유지 보수 및 시공성 측면을 고려하여 타 분야와의 업무분장(Work scope)을 검토해야 한다.

자.  옥외전력시설물(옥외변압기, 다회로개폐기 등)은 주변 경관성 및 부하공급 효율성 등을 고려하여 규격 및 위치 선정하며, 기존 전력시설물에 영향이 가지 않도록 보호 대책을 검토하여 설계해야 한다.

차.  지급자재 조달에 관한 제반사항을 검토해야 한다.

카.  전력시설물의 지진 등 안전성, 유지 관리성 등을 고려하여 설계해야 한다.

타.  소방전기시설은 관련법규 및 규정에 부합하는 설비 및 시스템을 검토하여 설계에 반영하고, 기존 운영 중인 자동화재 탐지설비의 화재연동프로그램(FAS)과 연계할 수 있도록 공항 관계자와 사전 협의하여 방재센터에서 감시 및 제어가 가능하도록 구성해야 한다.

파.  비상콘센트, 비상방송, 비상조명, 제연설비 및 방화 셔터 등에 대한 업무 구분을 검토하여 설계도서에 명확히 반영해야 한다.

하.  소방전기시설은 관련 법규에 부합되는 소방 설비를 검토하여 설계에 반영해야 한다.

3.4.3	소방전기설비

가.	소방전기시설은 관련법규에 부합되는 소방설비를 검토하여 설계에 반영, 또한 공항 자동화재탐지설비(FAS)와 연계할 수 있도록 사전 검토 후 설계에 반영하고 방재센터에서 감시 및 제어가 가능하도록 구성

3.4.4	에너지 절약 설계 (필요 시)

가.  최신의 에너지 절감 기술 및 유사사례를 검토한 에너지 절약설계 계획을 필요시 “공사”와 협의하여 추진해야 한다.

나.  계약상대자는 전체 시설이 “공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정”의 “제3장 건축물부문 에너지이용 합리화”의 지침에 부합되는 설계를 시행해야 한다.

다.	계약상대자는 기 시공된 시설의 현황을 검토하여, 간섭되는 부분에 대한 대책을 마련해야 하며, 필요시 법규에 따라 신․재생에너지 공급의무 비율이 “신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법”에서 정한 기준에 부합하는 설계를 시행해야 한다.

라.	건물의 구조, 각종 설비를 에너지절약 측면에서 대안을 제시하고 경제성, 투자비, 생애주기비용(LCC) 등을 종합 비교 검토하여 최적의 에너지 효율 설계가 되도록 다음 사항을 참고하여 계획해야 한다.

1) 창호․벽체․슬래브․지붕 등 건축 요소에 방풍․방한․단열 등 에너지 절약 구조로 설계

2) 환경적 특성, 경제성, 효율성, 쾌적성 등을 고려하여 에너지 절감 기술을 도입하고 다음 사항을 고려해야 한다.

- 건물 용도별로 적정한 온･습도와 건강하고 깨끗한 공기질 조건 설정

- 적절한 공조구획 설정으로 운전의 편리성과 에너지손실 억제

- 중간기나 필요시 외기냉방을 실시할 수 있는 방식 도입

- 공조구획별 특성에 맞는 공조방식을 채택하여 에너지 절감

- 실내 환경조건에 따른 외기도입량 제어

- 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고,  건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

마.  적용시스템에 의한 에너지절약의 구체적 효과분석, 운영비 및 절약 목표치를

제시해야 한다.

바. 건축물 에너지효율 향상을 위한 “건축물 에너지 효율등급 인증규정”의 평가 기준에 따른 에너지 소비량을 파악하여 제시하고 필요시 최적의 목표 등급을 제시해야 한다.

사.  에너지 기자재 및 신재생에너지 설비에 대해서는 “고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정” 및 “신재생에너지 설비 인증에 관한 규정”에 의한 인증기기를 채택한다.

아.  LED 조명기구는 “에너지이용 합리화법” 등 관련 법에 의거하여 설치 비율을 적용하며, 기능 및 규격이 설치 목적에 미달되는 경우에는 일반조명으로 설치한다.

자.  고효율 LED조명은 KSC 7658(국가표준인증 증 가로등 인증조건) 및 에너지관리공단에서 인증하는 고효율 제품을 도입해야 한다.

차. 설계완료 이전 에너지 절약설계와 관련된 법, 규정 또는 지침이 개정되는 경우 개정된 내용을 반영해야 한다.

카. “신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제12조 제2항 및 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정, 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침을 준수하여 신·재생에너지 적용 종류, 용량, 설치 위치 등 종합적으로 검토하여 공사 관련부서(기계, 전기 등)와 협의 후 계획해야 한다.

3.4.6	통신 분야

가.	건축 계획에 따라 실 수요 예측 및 산출을 검토하여 공항통신 시스템의   수요량을 산출하여 수요에 따른 최적의 설계를 해야 한다.

나.	모든 정보통신 관련 설비는 제반 현장여건 및 관련법규를 면밀히 검토하여 설계에 반영, 향후 확장 및 여건 변화에 대응할 수 있도록 설계해야 한다.

다.	공항통신 시스템(통합배선, 안내방송설비, 영상설비, 교환설비,  UPS 등)설계는 운영체계 및 향후 확장성, 기존 시스템 연계, 지역적 환경 및 특성을 면밀히 검토하여 설계해야 한다.

라.  인입 통신관로(관로/선로)는 관련부서와 협의 후 설계에 반영해야 한다.

마.  기존 운영 중인 정보통신 관련 시스템과의 연계성도 검토하여, 설계에 반영해야 한다.

바.  지하시설물(통신관로·맨홀 등)에 대한 간섭 현황을 파악하고 시스템 영향 범위를 조사하여 기존 운영 중인 시스템에 영향이 없도록 대책을 마련하여 설계에 반영해야 한다.

3.4.7	보안 분야

가.	건축 계획에 따라 실 수요 예측 및 산출을 검토하여 공항통신 및 네트워크 설비의 수요량을 산출하여 설계해야 한다.

1) 통합배관 및 배선설비

2) 안내방송설비

3) 영상안내설비(필요시)

4) 운항정보표출설비 및 데이터통신설비

5) 보안설비

나.  모든 정보통신 관련 설비는 제반 현장여건 및 관련법규를 면밀히 검토하여 설계에 반영, 향후 확장 및 여건 변화에 대응할 수 있도록 설계해야 한다.

다.	공항통신 인프라시스템(통합배관배선, 영상통신, 안내방송, 교환설비, 무선통신설비, 네트워크, UPS 등)은 공항 메인 시스템과 연계된 시스템으로 설계는 운영체계 및 향후 확장성, 기존 시스템 연계, 지역적 환경 및 특성을 면밀히 검토하여 설계해야 한다.

라.  인입 통신관로(관로/선로)는 관련부서와 협의 후 설계에 반영해야 한다.

마.	경비보안시스템은 다음 내용을 포함하여 설계해야 한다.

1) 최적의 보안감시를 위한 CCTV 위치, 규격 및 수량

2) 주요 실 보안통제를 위한 출입통제시스템 적정 배치

3) 기존 경비보안시스템 및 침입감지시스템과 완벽한 호환성을 갖출 수 있는 시스템으로 설계

바.  기존 운영 중인 정보통신 관련 시스템과의 연계성도 검토하여, 설계에 반영해야 한다.

사.  지하시설물(통신관로·맨홀 등)에 대한 간섭 현황을 파악하고 시스템 영향 범위를 조사하여 기존 운영 중인 시스템에 영향이 없도록 대책을 마련하여 설계에 반영해야 한다.

3.4.8	교통 ‧ 주차설비분야(필요시)

가.	주차관제시스템 설계는 다음과 같은 사항을 고려하여 설계

1)	기존 주차관제시스템과의 연계사항

2)	주차장 규모를 고려한 감시용 CCTV설비의 위치 및 수량

3)	진출입 개소 및 유‧무인 여부에 따른 적정한 주차관제설비

4)	4면 촬영시스템, 아일랜드 등 기타 요구사항 반영

나.	교통시스템 설계는 다음과 같은 사항을 고려하여 설계

1)	기존 교통시스템과의 연계사항

2)	주차장 앞 교통량을 감안한 신호등 배치

3)	신호등 설치 시에는 교통영향평가 시 의견을 고려하여 설계

다.	교통안전시설 설치

1)	교통신호 등 교통관련 시설을 검토하여 도면 및 시방서 등 설계도서를 작성

2)	교통안전시설 심의를 위한 설계 도서를 제출하고, 심의 결과 반영 등 심의에 대한 업무지원 및 협조

3)	기존 운영 중인 교통 관련 시스템과의 연계성도 검토하여, 설계에 반영

3.4.9	자동문(필요 시)

가.  많은 인원의 상시 통행, 외기 노출, 먼지, 진동 등 가혹한 작동 환경조건에도 고속 자동 개폐의 성능 유지와 짐 또는 사람과의 충돌에 대한 안전기능 확보가 뛰어난 형식이어야 한다.

나.  염기와 강풍 등 입지 환경에서 예상되는 환경조건에 적응할 수 있는 충분한 출력의 동력 장치와 내염성이 고려된 기계 재질로 제작 설계가 되어야 한다.

다.  관계법령 및 검사기준에 적합하도록 계획해야 하며, 필요시 국외(UL, JIS 등) 규격 등 참고하여 안전에 필요한 부분은 관련부서와 협의하여 반영해야한다.

라.  자동문은 중앙감시반에서 원격 제어되는 방식으로 작동상태에 대하여 자동문 컨트롤러(현장) 및 중앙 감시반에 표시되어야 하며, 중앙 감시반에서 필요한 총괄제어 또는 부분제어가 가능하도록 설계 되어야 한다.(장애인용 화장실 자동문 설계 시 비상용인터폰도 포함하여 설계되어야 한다.)

마.   피난구역 또는 비상탈출이 필요한 지역에 설치되는 자동문은 평상시 자동 미서기문(Automatic Sliding Door)으로 개폐 작동되면서도, 화재, 폭발 등 비상 피난의 경우 NFPA101 규정에 적합한 피난 방향으로(Swing Open) Breakout 작동이 되는 형식이어야 한다.

바.  빈번한 충돌에도 Door가 레일에서 탈선 되지 않도록 탈선방지 안전 기능이 제시되어야 한다.

사.  안전감지 기능은 돌출물체도 충분히 감지되도록 선감지센서(Photo Cell)등  한 가지 이상의 시스템으로 구성되어야하며, 센서의 범위는 자유롭게 조정이 가능해야한다.

아.  폐문 작동 중 물체 또는 사람과 충돌 시 문 또는 모터에서 부하를 감지하여 즉시 역회전 되는 기능이 있어야 한다.

자.  정전 시에는 무 부하 상태로 수동 작동이 용이하도록 자동 전환되어야 한다.

3.4.11	기타사항

가.	시공상세도면이 필요한 경우 시공상세도면 목록을 공사시방서에 명시

나.	시공 과정 중 시공 상태에 대한 검토 및 확인을 받아야하는 대상공종은 시방서에 구체적으로 명시

		제 4장 용역수행방법

제4장  기타 용역수행방법

4.1	일반사항

4.1.1	계약대상자는 대상시설을 설계함에 있어 건설기술진흥법 등의 설계도서 작성기준과 공사의 공항시설 설계기준서 및 공항시설 전문시방서 등 최신 법령과 기준을 적용 및 참조하여 설계하여야 하며, 대상시설물이 자체 운영 및 기능발휘는 물론 기존의 각 공항시설과 연계 운영될 수 있도록 설계하여야 한다.

4.1.2	대상 시설의 기능성, 경제성 및 환경과의 조화를 고려하여 위험을 발생시키지 아니하는 안전한 구조를 가지도록 설계해야 하며, 본 시설을 구성하는 구조 부재 등에 대한 지역적․기후적 여건을 감안하여 염기부식을 방지할 수 있도록 대책을 강구하여 설계에 적용해야 한다.

4.1.3	자재, 공법의 선택, 구조물의 규격결정 등 설계를 효율적으로 수행함으로써 “공사”의 예산 범위 내에서 가장 경제적인 설계가 되어야 하며, 부득이한 사유로 공사비가 증가할 경우에 “계약상대자”는 “공사”와 협의하여 적정 공사비로 조정․반영해야 한다.

4.1.4	설계과정에서 유사 사례를 조사 및 비교․분석하여 설계에 최대한 반영하고, 그 조사 및 분석결과를 "공사"에 제출하여야 한다.

4.1.5	모든 설계는 정보화시대에 부합하는 종합 정보통신기능을 수행 할 수 있는 시설로 설계하고, 건축물의 에너지절약설계 기준을 적용해야 한다.

4.1.6	건설기술진흥법 제 14조의 규정에 따라 지정․고시된 신기술을 특별한 사유가 없는 한 우선 검토하여 설계에 반영해야 하며, 필요시에는 신기술개발자로 하여금 신기술과 관련되는 공정에 참여하게 할 수 있으며, 그 경우에는 “공사”와 사전협의를 해야 한다.(환경 신기술 등 타법에 의해 지정된 신기술도 필요시 설계 반영 여부 검토)

4.1.7	모든 설계는 내구성, 경제성, 유지관리 및 보수, 시공성 등을 충분히  감안하여 실현 가능성이 있도록 계획해야 하고 품질확보 방안의 수립은 물론, 건설공기 확보 및 예산 절감을 위한 방안을 최대한 적용하여 계획 해야 한다.

4.1.8	본 시설물의 건설공사 중 기존 시설물에 대한 피해 및 각종 유틸리티 연계에 따른 간섭사항이 발생되지 않도록 주변지역 시설물(지하시설포함) 현황을 사전에 충분히 검토한 후에 설계를 진행해야 한다. 또한 공사 중 미관을 고려하여 가시설물 설치계획 등을 철저히 수립하여 설계에 반영해야 한다.

4.1.9	"계약상대자"는 본 사업시행을 위한 실시계획승인, 관련법에 의한 각종 인․허가 등과 심의․자문 등과 관련한 제반서류 등을 준비하여 관련기관에 설명하여야 하고, 지적사항이 있을 경우 "계약상대자"의 부담으로 이를 검토․반영하여야 한다.

4.1.10	모든 설계는 내구성, 경제성, 유지관리 및 보수, 시공성 등을 충분히  감안하여 실현 가능성이 있도록 계획하여야 하고 품질확보 방안의 수립은 물론, 건설공기 확보 및 예산절감을 위해 조립식 및 기계화 시공 등을 최대한 적용하여 계획하여야 한다.

4.2	공정관리

4.2.1	“계약상대자”는 ‘계약상대자 종합공정표’를 작성하여 과업수행계획서에 포함하여  제출(계약 후 20일 이내)해야 하며, 공정표에 적용하는 과업별, 단계별 가중치는 "공사"와 협의하여 결정하고 공정관리가 체계적으로 시행되도록 하여야 한다.

4.2.2	‘계약상대자 종합공정표’는 성과품 개별목록과 작성 착수일, 월별진도 보고일, 단계별 성과품 제출일 등이 포함되어야 한다.

4.2.3	“계약상대자”의 공정표 작성 또는 공정보고 시 제출되는 공정표는 주요 마일스톤(Milestone)이 표기된 Bar-Chart방식으로 작성해야 한다.

4.2.4	“계약상대자”는 구체적이고도 실질적인 공정관리로 용역의 지연을 사전에 방지하고, 공정 지연 시에는 만회대책을 수립․시행해야 한다.

4.2.5  “계약상대자”는 용역 수행과 관련되는 정보 및 자료제출은 “공사”의 설계관리절차서 등의 사업관리 관련 절차서에 따라 조치해야 한다.

4.3	자료관리

4.3.1	“계약상대자”는 “공사”의 ‘자료관리절차서 등’ 관련 절차서 요건에 따라 관리대상 자료를 자료별 특성에 따라 분류하고, 적합한 자료관리 체계를 수립․운영해야 한다.

4.3.2	“계약상대자”는 모든 자료를 체계적으로 분류, 보관하고, 용역 준공 후 “공사”의 자료이관요건․절차에 따라 이관해야 한다.

4.3.3	“계약상대자”는 “공사”가 제공하는 사업번호체계에 따라 “계약상대자”가 생산․제출 하는 모든 자료에 관련번호를 부여하여 관리해야 한다.

4.3.4	"계약상대자"는 과업수행 기간 중 또는 과업 종료 후에 "공사"에 제출하는 모든 문서 및 성과물은 "공사"의 자료관리절차서에 의거 제시된 일정에 따라 작성․제출하여야 하며, "공사"가 제공하는 사업번호체계절차서에 따라 생산․제출 하는 모든 자료에 관리번호를 부여하여 관리하여야 한다.

4.3.5	"계약상대자"는 모든 자료를 체계적으로 분류, 보관하고, 용역 준공 후 "공사"의 자료 이관 요건․절차에 따라 체계적으로 이관하여야 한다.

4.4	환경관리

4.4.1	인천국제공항건설 환경영향평가 협의내용을 검토하여 협의내용에 포함되지 아니한 다른 사업계획을 추진하는 경우에는 환경영향평가 관련법규에 따라 재협의 또는 협의내용 변경절차 시행방법을 검토하여 적기에 이행될 수 있도록 지원해야 한다.

4.4.2	해당 시설의 시공과 관련한 건설폐기물에 대하여는 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 및 폐기물관리법에 의거 폐기물처리방안을 수립하고, 건설현장의 건설폐기물 처리비용 및 환경훼손 및 오염방지와 등이 포함된 환경관리비를 관련법에 의거 적정하게 산정․반영해야 한다.

4.4.3	해당 시설의 시공과 관련하여 다수인의 이용시설에는 공기정화설비 ․환기 설비의 설치를 검토하고, 유해건축자재를 사용하여서는 아니 된다.

4.4.4	환경관련 최신 기술(Best Practice)의 도입을 적극적으로 검토하여야 하며, 친환경적인 시설물이 되도록 설계하여야 한다.

4.5	품질관리

4.5.1	“공사”는 공항시설의 목표 품질을 확보하기 위하여 ISO9001품질경영요건에 ㅎ따른 품질경영시스템을 구축하여 운영하고 있으므로 “계약상대자”는 본 용역에 대한 품질경영체계를 수립하여 과업수행계획서에 포함하여 제출해야 하며, "공사"의 “설계사용 품질경영시방서” 내용을 이행하여야 한다.

4.5.2	본 용역의 계약기간 및 난이도 등을 감안하여 특성상 품질경영체계 구축 및 운영이 불합리하다고 판단될 경우에는 이행면제 또는 축소 등 조정하여 적용할 수 있다.

4.5.3	품질관리 대상 공종 및 모든 자재․부재에 대하여 품질기준을 설정하고, 품질시험빈도(KS제품도 시험실시)를 제시해야 하며, 이에 대한 품질 시험비를 빠짐없이 산정해야 한다.

4.6	설계심의․자문 등

4.6.1	“계약상대자”는 본 사업시행을 위한 실시계획승인, 관련법에 의한 각종 인․허가, 각종 심의 등이 원활하게 추진될 수 있도록 관련 제반서류 등을 준비하고, 해당기관 설명 등의 업무를 수행해야 한다.

4.6.2	“공사”가 필요시에 “계약상대자”는 “공사”에서 구성․운영하는 자문위원 또는 외부 전문가에게 자문을 받아야 한다.

4.6.3	“계약상대자”는 각종 심의결과, 인허가, 설계자문 등의 결과, 지적받은 사항이 있는 경우 검토하여 설계에 반영하는 등 필요한 조치를 취해야 한다.

4.6.4	설계사는 전문분야(인테리어 등)에 대하여 자문계획을 수립하여 "공사"의 승인을 득한 후 자문을 시행하여야 한다.

4.7	기타사항

4.7.1	건설기술용역평가자료 작성 및 제출

“계약상대자”는 건설기술진흥법 시행령 제82조(건설기술용역 및 시공평가의 대상) 및 제83조(건설기술용역 평가 및 시공능력평가의 기준 및 절차)의 규정에 의한 용역평가 및 용역능력평가에 필요한 관련 자료를 작성하여 제출해야 한다.

4.7.2	Issue Paper 관리

가. "계약상대자"는 분야별로 주요 기술검토 사항은 중간성과물 제출시기와 관계없이 Issue Paper로 제출하여 "공사" 또는 외부전문가의 검토를 거치도록 하여야 한다.

나. "계약상대자"는 효율적인 Issue Paper 관리를 위해 과업초기에 Issue Paper 관리방법과 List를 제출하고, 이에 따라 과업을 수행하여야 한다.

다. 과업수행 중에 제출된 Issue Paper는 관련분야별로 정리/취합(제출목록표 작성)하여 기본 및 실시설계 각 90% 성과물 제출시에 함께 제출(전자파일 포함) 한다.

4.7.3 회의참석

가. "계약상대자"는 회의진행에 필요한 관련 자료를 작성하여 "공사"에 제공하고 설명하여야 한다.

나. "계약상대자"는 회의내용을 기록․관리하고, 회의 안건에 대한 처리결과를 "공사"에 보고하여야 한다.

다. "계약상대자"는 본 설계용역의 진행과정 중에 발생 또는 발생이 예측되는 사항에 대하여 중점의제로 관리하여야 한다.

4.7.4 설계용역 보고회

가. "공사"는 설계용역을 수행하는 과정에서 발생되는 문제점을 조속히 해결하고 설계 패키지 간 인터페이스 해결을 목적으로 설계용역 보고회의 개최 및 참여를 요구할 수 있으며, 공사 보고회의 개최 및 참여 시 관련분야 설계책임자가 설명하여야 한다.

나. "계약상대자"는 보고회 개최에 필요한 자료 등을 공사 요구하는 내용 및 기한까지 충실히 하여 내실 있는 보고회가 되도록 적극 노력하여야 한다.

4.8 간섭사항 사전 체크

4.8.1 기 운영중인 공항시설의 시설현황, 시스템 구축 및 운영현황 등을 면밀히 검토하여 도출된 문제점에 대하여는 사안별 대책을 수립․반영함으로써 본 사업시행과 시설의 개별 및 연계 운영 시 문제점이 발생되지 않도록 조치하여야 한다.

4.8.2 각 시설별 전력, 통신, 급수, 중수, 중․온수, 오수, 우수, 도시가스  등 각종 유틸리티 연계에 따른 간섭사항이 발생되지 않도록 주변지역의 지하시설현황을 사전 파악하는 등 사전에 충분한 검토를 거친 후에 설계를 진행하여야 한다.

4.8.3 각 건물 간, 건물의 내부시설 간 및 주변시설과의 간섭사항을 해소하기 위해 "공사"의 기존 관련 자료 및 시스템 등으로 사전 확인 후 설계를 진행하여야 한다.

4.8.4 대상 시설의 건설공사 중 공항운영시스템 및 기존시설물에 대해 어떤 피해도 발생되지 않도록 굴토, 기초공법, 타워크레인의 설치 등 가 시설물 설치계획을 철저히 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

4.9 사업지원

4.9.1 입찰안내서(RFP 또는 구매시방서 등) 작성(필요 시)

가. 본 설계내용의 품질이 보증되고 시설기능이 충분히 발휘될 수 있는 내용으로 작성하고 공사의 기자재 제조구매․설치 발주업무 및 관련 용역수행과 건설 사업에 차질이 발생되지 않도록 제출기일을 엄수하여야 한다.

4.9.2 공사지원계획서 작성

4.9.2.1 공사 지원계획 수립

가. "계약상대자"는 설계내용의 현장구현에 가장 적합한 공사 지원계획 및 향후 공항시설 관련 공사 경계 등을 수립하여 제출하고 공사 지원계획에 따른 소요예산은 공사비내역서에 반영하여야 한다.

나. 지원계획에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 건설사무소 및 자재적치장 계획(위치, 규모 등)

2) 공사용 차량 및 인원의 현장 진입도로 및 주차 계획

3) 공사용 전기, 통신, 용수 계획

4) 건설현장 환경관리계획(소음, 분진, 진동, 환기 등)

5) 자재 및 장비 출입 동선(무중단 운영 고려)

6) 설계범위내 지장물 철거, 이설계획

7) 공사 단계별 시공 및 가설계획(무중단 운영 고려)

8) 공종별 폐기물 종류별 발생량 추정 및 처리방안 수립

9) 기타 공사시행과 공사발주에 필요한 지원계획

다. "계약상대자"는 현장 시공 중 설계의도의 왜곡이 우려되거나 특수공법의 주요 설계내용에 대하여는 설계내용의 현장적용을 가능케 하는 공사 계획을 작성하여 공사에 제출하여야 한다.

4.9.2.2 공사 지원계획의 수립 시에는 관련 설계사와 충분한 협의와 사전검토를 거쳐야 한다.

제5장  용역성과품 작성 및 납품

5.1	작성원칙

5.1.1	설계도서의 형식 및 체계 “공사”의 설계통합기준서 및 사업관리체계 등 성과물작성기준에 부합하게 작성해야 한다.

5.1.2	모든 설계도면은 “공사”에서 운영 중인 CAD System과 완벽하게 호환이 되는 것으로 작성해야 한다. 이때 제출형식 및 방법은 “공사”와 사전 협의해야 한다.

5.1.3	모든 설계도서(시방서 등)는 “공사”의 전산시스템에 호환되는 워드프로세스 파일형식으로 작성해야 하며 “공사”와 협의하여 결정한다. 수치계산이 필요한 내역서, 수량산출서, 단가산출서, 각종 계산서 등의 경우에는 엑셀형식으로 작성해야 하며, 작성된 EMS(Estimate Management System, 통합내역관리)파일을 제출해야 한다.

5.1.4	“공사”에 제출하는 모든 용역 성과물은 “공사”의 문서표준화 계획에 부합되도록 XML(Extensible Markup Language)화된 파일을 작성, 제출함을 원칙으로 하나 “공사”는 이를 조정할 수 있다.

5.1.5	설계 성과품의 편집 및 인쇄방법은 “공사”와 사전 협의해야 하며, 성과품의 제출시기, 규격 및 수량 등은 용역수행의 효율성을 위해 필요한 경우 상호 협의․조정할 수 있다.

5.1.6	자료제출 시 “공사”의 자료관리절차서에 따라 제출목록을 작성하여 전자 파일(CD)과 출력된 목록 1부를 제출해야 한다.

5.1.7	각 도면의 페이지마다 키(Key) 도면을 삽입하고, 관련되는 도면번호를 명시한다.

5.1.8	“공사”가 대내외 설명 및 보고 등을 위한 자료(도면․내용 등)를 요청할 경우에는 관련 자료를 제출해야 한다.

5.1.9	성과품 작성 시 인용된 참고자료는 각주에 의거 출처를 명시하고, 관련 참고자료는 별도 제출해야 하며, 제출방법은 “공사”와 협의한다.

5.1.10	설계도면은 누락된 부분이 없고 현장기술자들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 분야별로 상세히 작성해야 한다.

5.1.11	설계도면의 내용에 있어 다음사항을 상세히 명기하여 시공 및 적산에 용이하도록 작성한다.

가.	각부 치수의 정확한 표기(치수는 미터법 사용)

나.	각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명기

다.	각종 자재의 품질, 규격, 사양, 형태의 표시

라.	각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등 명기

마.	각종 부착물 및 부품에 대한 명시

바.	특수공법에 대한 공인기관의 기술검토 보고서 첨부 및 설명서(상세도)의 작성

사.	도면 이해를 위한 주기사항 및 시공 시 유의사항 명기

아.	부호, ROOM NAME등 표기

자.	천정고, 깊이, 구배, 면적 등 표기

차.	계통설명도, 수량 집계표

카.	기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

타.	투시도 작성 시 대상 공간에 대한 주요특성 및 재료를 반영하여 표현

5.1.12	설계 성과물은 단계별(승인용, 준공용)로 “공사”의 승인절차를 받아야 하며, 설계검토 및 설계도서 작성 시 고려되어야 할 사항은 다음과 같다.

가.	시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 설계

나.	환경 친화적인 건설공사를 위한 공법의 적용

다.	본 사업 추진에 따른 클레임 발생이 발생되지 않도록 설계도서 작성

라.	적용 가능한 건설신기술 및 공법 검토 및 반영

마.	공사 추진 일정에 적합한 공사용 도면 패키지 설계

바.	전기분야(소방전기포함)는 전기 및 소방전기를 분리하여 별도 패키지로 성과물 제출

사.	중소기업촉진법에 따른 분리 발주

5.2	작성 세부내용

5.2.1	설계 설명서

주요 부분에 대하여 그림을 병기한 서술식으로 최소한 다음 사항을 포함하여 작성한다.

가.	설계개요 및 설계 개념

나.	사업부지 여건 및 현황(공간)분석 [공사부지 활용계획 포함 등]

다.	설계의 방향 및 설계적용기준(관련법규 등)

라.	제반 법규 검토 및 인허가 절차

마.	소요면적 분석

바.	수평․ 수직 동선계획(이용객동선 및 차량동선) 및 자재‧장비반입동선

사.	건축평면 / 입면계획 / 단면계획 / 구조계획

아.	건물 내 외부 마감 및 색채계획(Signage, 가구집기류 계획포함)

자.	조경시설 계획

차.	기계설비계획(승강설비 포함) / 전기설비계획(자동화재탐지설비 포함) / 정보통신설비계획(건물 인입 관로/선로 포함)

카.	CCTV 등 보안계획

타.	통신 및 보안 설비계획 / 소방전기 설비계획 / 피난 / 방재

파.	신재생에너지설비 설치 계획 및 환경오염 방지계획 (필요 시)

하.	기존 시설물 철거(이설) 계획서(필요 시 관계 부서와 협의한 결과 포함)

갸.  기타 본 설계에 대하여 설명이 필요하다고 판단하는 사항

냐.  정보통신설비계획(건물 인입 관로/선로 포함)

5.2.2	구조설계서

구조설계가 완료 후 보고서에 수록할 내용은 다음과 같으며 필요에 따라 스케치를 병기하고 구조계산서는 컴퓨터에 의한 경우라도 설계검토자 및 시공자의 이해를 돕기 위해 구조 해석을 서술식으로 정리한다.

가.	설계근거자료

나.	구조 재료의 규격 및 설계기준 강도

다.	구조물의 하중 및 지내력에 대한 제반조건

라.	기초의 형식선정 및 비교검토근거

마.	구조 형식의 선정 근거 및 각부 구조계획

바.	주요 구조부재의 단면 산정계산서

사.	내진구조 계획

아.	주요부분 철골부재 및 철근 콘크리트 부재계획 등

5.2.3	소요면적 계산서(설계설명서 및 도면에 포함)

가.	면적 총괄표

나.	층별 면적표  /  각 실별 면적표 (공용 및 전용공간 구분)

다.	기능별 소요면적 산정기준 및 계산서 (관련 도면 첨부)

5.2.4	에너지절약계획서

필요 시 건축물의 에너지절약설계기준 등 관련 법규에 따른 에너지절약계획서를 작성하여 “공사”의 검토를 받아 제출한다.

5.2.5	건설공사 공정계획서

가.	건설공사 예정공정표 작성

나.	대상시설에 대한 각 시설 및 공종별 세부공정표 작성

5.2.6	공사비 내역서

가.	내역서 작성원칙 및 기준에 따라 각 분야별, 계약 Package별 공사비 내역을 누락됨이 없이 산출해야 한다.

나.	관련법에서 정하는 신재생에너지 설비설치, 품질시험비용, 퇴직금, 안전 관리비, 환경관리비, 폐기물처리비, 건설안전점검비, 산업재해보험, 퇴직 공제보험 및 각종의 제세공과금과 특허료, 기술료 등 사업시행을 위하여 “공사”가 확보해야 하는 예산항목을 필요 시 빠짐없이 산정해야 한다.

다.	공사비 내역서상 누락 또는 과다계상 등으로 인하여 발생하는 사항에 대해서는 “계약상대자”에게 그 책임이 있으며, 이에 대하여 “공사”는 건설기술진흥법 등 관련 법령 등에 따라 적법한 조치를 취할 수 있다.

라.	공종별 집계에 대한 공종별 내역 작성 시 상세내역 작성을 원칙으로 하며, 부득이 1식으로 된 내역을 제시할 경우 반드시 근거도 같이 작성 ․ 제출해야 한다.

5.2.7	단가산출서

가.	내역단가의 품과 노임단가는 최근 발행된 표준품셈과 조사기관이 공표한 시중노임단가를 기준 한다.

나.	자재단가는 3개 이상의 시중 물가지에 등재된 가격 중 가장 낮은 가격을 적용하며, 공종별 내용이 국토교통부, 조달청 등 실적공사비 항목에 해당할 경우 이를 비교 적용한다.

다.	표준품셈의 기준이 비현실적이고 비합리적이라고 판단되거나, 표준 품셈에 의하여 산출하기 곤란한 항목의 경우에는 3개 이상의 전문 업체로부터 견적서를 받아 그 중에서 가장 낮은 가격을 설계단가로 한다.

라.	전문업체 견적가로 설계단가를 산출할 경우 기존 “공사”에서 발주된 공사비 내역 단가를 비교 우선 참고하여 설계단가를 결정한다.

마.	단가 비교 시에는 단위가격은 물론 기술, 성능적인 장․단점도 함께 비교 검토해야 한다.

5.2.8	수량산출서

가.	수량내역은 공종별로 동일한 산출기준에 의거 계산하되 표준품셈을 기준으로 산출한다.

나.	산출된 수량은 공종별, 공정별로 취합하여 합산한다.

5.2.9	공사시방서

가.	“공사”의 공항시설 전문시방서를 기준으로 작성하되 필요 시 국토교통부 제정 표준시방서 등을 참고하고, 서로 상치하는 경우 가장 합리적인 것을 채택하고 국내 상황에 적합하도록 작성해야 한다.

나.	설계 개념상 특수공법이 적용되는 부분은 이에 대한 공법개요, 특기사항, 적용사례 등을 기술한다.

다.	건설공사의 진행 단계별로 시공사가 작성해야 하는 시공상세도면의 목록을 표기한다.

라.	설치되는 자재 및 장비에 대한 구매규격서 및 설치시방서를 작성한다.

마.	기타 시공에 필요한 제반 품질시험․관리, 안전관리, 환경관리 이행사항 등을 기술한다.

바.	발주용 도서 제출 및 준공 시  분리발주 및 제작 ․ 구매에 대한 입찰안내서 (구매시방서)는 “공사”와 협의하여 별권으로 제출하며, 구매시방서 내용에는 기술규격서를 포함하여 작성해야 한다.

5.2.10	설비계산서

가.	기계설비

1) 주요 유틸리티 용량계산서 및 부하계산서

2) 장비 및 시스템 선정 비교 검토서

3)	배관관경 산정 및 마찰저항, 공조 풍량 계산서

4) 기타 필요사항

나.	전기설비

1)	조도계산서 / 부하계산서(PANEL별) / 부하일람표(일반, 비상부하 집계표)

2)	용량계산서(변압기 및 차단기 단락용량 계산서, 주간선 케이블 포함)

3)	변전실, EPS 실 면적 및 배치 검토서

4)	소방(전기)설비 관련 계산서 / 계전기 보호협조 및 정정치 계산서

5)	설비관련 계산서 등 기타 필요한 사항

다.	통신설비

1)	설비용량계산서

2) 통신케이블 선정기준 및 계산서

3) 통신수요

4) 장비 및 시스템 선정 검토보고서

5) 통신배관․배선 용량계산서

6) 기타 필요사항

라.	보안설비

1)	설비용량계산서 / 보안설비용 케이블 선정기준 및 계산서

2) 보안설비수요(출입통제시스템,CCTV 등 구분)/ 장비 및 시스템 선정 검토보고서

3)	보안설비 배관․배선 용량계산서

4)	기타 필요사항

마.	소방설비

1)	소방 및 제연 설비용량 계산서  / 장비선정 비교검토

2) 각종기기류 및 압력계산  / 배관경산정 및 마찰저항계산 / 기타 필요사항

3) 제연에 대한 기구일람표, 댐퍼 및 장비 스케줄

바.	승강설비 (필요시)

1)	승강설비 부하(속도, 정원 등) 계산서

2)	승강설비 수량 계산서

3)	기타 필요사항

사.  신·재생에너지 설비 (필요시)

1)	신·재생에너지 설비 계산서(케이블 포함)

2) 신·재생에너지 선정 검토 보고서

3) 신·재생에너지 구조설계서

4) 기타 필요 사항

5.2.11	시설물유지관리지침서

가.	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 및 동법 시행령에 의한 유지관리계획

나.	시설물 유지관리가 용이하도록 각 분야별로 시설물의 규격과 기능이 설명되고 유지관리를 위한 부대시설과 소요예산 등을 명기해야 한다.

다.	시설물의 유지관리가 용이하도록 설계논리, 하자 예상부분 등을 정리하여 유지 보수자가 쉽게 이해하여 유지보수를 할 수 있도록 작성해야한다.

5.2.12	마감자재 검토 보고서

가.	계획에 포함된 모든 마감자재, 집기, 기기(설비 포함)의 상세 제원 및 설치방법을 이미지, 도면과 함께 기입한다.

나.	특정업체의 제품으로 지정할 수 없으며, 동등한 수준의 제품을 생산, 판매하는 업체 3곳 이상을 함께 기입한다.

다.	제품의 보관, 설치 등에 특이사항이 있을 경우 이를 함께 기재하여 시공에 어려움이 없도록 한다.

라.	시공 상의 누락이 없도록 한다.

5.2.13	설계도면

「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」[별표2] 건축 설계 도서작성의 “상급” 기준으로 작성 제출한다.

가.	건 축

1)	일반 도면

- 안내도 / 구적도 / 지적도 / 대지 종횡단면도

- 각 층 면적 산출표  /  내․외부 마감 일람표(인테리어 마감재 포함)

- 배치도 / 각층 평면도 / 입면도 / 주 단면도 / 실내 벽 및 천정 마감도 등

2)	부분 상세도

- 코어 / 계단 / 승강기 등 수직 동선 관련 평, 입, 단면 상세도

- 출입구 등 주요 부분 평, 입, 단면 상세도

- 확대 평‧입‧단면 상세도 / 외벽 입‧단면 상세도  / 지하 입‧단면 상세도 등

3)	내부 상세도

- 주요 시설 내부 마감 상세도 (전개도, 마감상세도 등)

- 시설 바닥 패턴도, 천정 상세도  / 칸막이 전개도 상세도

- 주요 마감재 설치 Detail 등

4)	창호도

- 창호 및 Hardware 일람표 / 각층 창호 일람표 / 창호도

- 평입단면도 / 상세도 / 잡철물 상세 및 목록표 등

5)	기타

- Signage 계획(위치) 및 상세도

- 가구집기류 계획(위치) 및 상세도

- 공종별 공사에 필요한 각부 상세도(연결부위 등)

- 기계장비 안착부위 별도 조성 및 구조보강

- 덕트, 배관, 케이블 트레이 등의 샤프트 및 피트, 라우팅 도면

- 기타 시공 상 필요하다고 판단되는 각종 도서 등

나.	구 조

1)	구조 일반사항

2)	구조기준도 / 주심도 / 구조평면도 / 각부 구조 단면도

3)	기둥, 기초, 슬래브, 보 일람표

4)	Core부 구조평면, 입면상세도

5)	배근상세도 및 Rebar Schedule

6)	열별 가구도(축조도)  / 구조부재 접합 상세도

7)	기타 시공 상 필요하다고 판단되는 각종 도서 등

다.	기계설비

1)	일반사항

- 범례표 / 도면목록 / 기계기구 일람표(수량, 용량, 시방, 기타사항)

- 기자재 명칭 및 공사품질 절차서에 따른 개별 식별번호(Tag No.)

- 배관(덕트)의 레벨, 유량(풍량), 유속(풍속), 설계 저항값 등 표기

2)	배치도(각종 장비 배치도 및 타 설비와 간섭사항 등)

3)	계통도

- 주요열원 설비

- 공기조화 설비 및 유틸리티설비

- 급배수, 급탕설비, 가스, 위생설비(필요시)

- 기타설비의 세부 계통도(자동제어 설비 포함)

4)	평면도 및 단면도

- 각종 설비 배치평면도

- 기계실 확대 평면도

- 가스도면(필요시 별도작성)

- 각종설비 기준층 및 특수층에 대한 주요단면도

- 장비 및 배관, 덕트, 전기․통신케이블 등이 포함된 기계실 단면도

- 여러 시설물이 교차되는 부분의 단면도

5)	옥외 유틸리티 매설배관 설치 평면도 및 단면도(상세도)

6)	상세도 : 각종 설비별 상세도, 입상Shaft, 장비주위, 맨홀연결배관의 상세

7)	기타 시공 상 필요하다고 판단되는 도서

라.	승강설비 (필요 시)

1)	일반사항

- 범례표 / 도면목록표 / 장비일람표

2)	배치도 / 평면도 / 단면도/ 상세도(주요부품 및 장비 등)

3)	기존 중앙관제시스템 통합 배선도(구성도 포함)

4)	비상통화장치 배선도

마.	전기설비

1)	일반사항

- 범례표 / 도면목록 / 기자재 명칭 및 개별 식별번호(Tag No.)

- 기기 일람표(수량, 용량, 시방, 기타사항)

2)	배치도

- 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥내․외에 설치되는 전기관계 시설물의 위치 평면도 및 전기기기 정격, 설치 상세도, 책임분계 등

3)	옥외간선도

- 동력설비 및 기타 전기설비의 옥외간선 평면도, 제반 간선의 정격 설치방법, 책임분계, 설치상세도 등

4)	수변전설비 설비도

- 수변전 설비의 제어계통 결선도로 각종기기, 제어 배선 등에 대한 정격, 조작방법, 기존시스템 연계관련 등 설명 포함 / 수변전 설비의 평면도 및 결선도, 단면도, 구조물도, 입면도

5)	각종 설비의 계통도 및 입상도

- 단선 계통도 / 간선 계통도  /  제어 계통도  /	입상도

6)	각종 설비의 배치도

- 전등/전열/ 동력 배치 및 결선 또는 배선도

7)	각종 결선도

- 동력설비 및 사용된 특수설비의 결선도와 각종기기와 배선의 정격과  총부하 표시

- 사용한 각종설비의 조작도 및 조작설명서

- 각 분전반의 결선도 및 연결 부하

8)	소방 전기

- 일반사항(기자재 명칭 및 개별 식별번호 포함) / 도면목록표 / 범례 및 주기사항

- 기기 및 장비 상세도, 결선도 / 수신반 내부 결선도, 배치도, 단면도, 상세도 등

- 계통도(자동화재탐지시스템 네트워크 구성 포함)/평면도(계통별 기기 주소 부여)

- 기자재 명칭 및 개별 식별번호(Tag No)

- FAS 연계관련 인터페이스 구성도(사업자 구분)

- 기타 필요한 사항

바.	통신설비

1)	일반사항

- 범례표(공사 표준심볼 및 국제표준기호 사용)

- 도면목록 및 약어

- Site Plan 및 건축 단면도

- 시설 일람표(시설별 구분 작성)

- 기자재 명칭 및 개별 식별번호(Tag. NO.) 추가

2)	간선도

- 건물 내외 통합배선 및 관로

- 시스템별 작성

(통합배선, 안내방송설비, 영상설비, 교환설비, UPS 등)

3)	설비 계통도 및 결선도

- 건물내외 통합배선 및 관로

- 시스템별 작성(통합배선, 안내방송설비, 영상설비, 교환설비, UPS 등)

4)	배치도 : 건축물 평면상의 통신시설 배치표기

- 건물내외 통합배선 및 관로

- 시스템별 작성(통합배선, 안내방송설비, 영상설비, 교환설비, UPS 등)

5)	평면도 / 천장도 / 장비 배치도

- 건물내외 통합배선 및 관로

- 통신실 내부 Rack 배치

- 시스템별 작성(통합배선, 안내방송설비, 영상설비, 교환설비, UPS 등)

6)	시스템 설치 상세도 : 설비의 설치공사에 필요한 설치도

- 건물내외 통합배선 및 관로

- Rack 내부 상세도

- 시스템별 작성(통합배선, 안내방송설비, 영상설비, 교환설비, UPS 등)

사.	보안설비

1)	일반사항

- 범례표(공사 표준심볼 및 국제표준기호 사용)

·	도면목록 및 약어

·	Site Plan 및 건축 단면도

·	시설 일람표(시설별 구분 작성)

·	기자재 명칭 및 개별 식별번호(Tag. NO.) 추가

2)	간선도

- 건물내외 보안설비용 선로 및 관로

- 네트워크망 보안설비 선로(필요시)

- 시스템별 작성(출입통제시스템, CCTV등)

3)	설비 계통도 및 결선도

- 건물내외 보안설비용 선로 및 관로

- 네트워크망 보안설비 선로(필요시)

- 시스템별 작성(출입통제시스템, CCTV등)

4)	배치도 : 건축물 평면상의 보안설비 배치표기

- 건물내외 보안설비용 선로 및 관로

- 네트워크망 보안설비 선로(필요시)

- 시스템별 작성(출입통제시스템, CCTV등)

5)	평면도 / 개요도 / 계통도 / 단면도 / 장비 배치도

- 건물내외 보안설비용 선로 및 관로

- 네트워크망 보안설비 선로(필요시)

- 시스템별 작성(출입통제시스템, CCTV등)

6)	시스템 설치 상세도 : 설비의 설치공사에 필요한 설치도

- 건물내외 보안설비용 선로 및 관로

- 네트워크망 보안설비 선로(필요시)

- 시스템별 작성(출입통제시스템, CCTV등)

아.	소방설비

1)	일반사항

- 범례표 / 도면목록 / 기기일람표(용도, 수량, 규격, 특기사항)

- 기자재 명칭 및 개별 식별번호 포함

- 배관의 레벨, 유량(풍량), 유속(풍속), 설계 저항값 등 표기

2)	배치도 / 계통도 / 평면도 / 단면도 / 상세도 / 기타

- 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 배관 및 장비의 설치 및 철거 상세도, 이설에 따른 살수 범위

- 타 설비와의 간섭사항 및 책임한계

- 배관 / 장비 / 작동(제어) 등 계통도

- 배관연결 상세도 / 설비조작도 및 작동설명

- 기타 필요한 사항

자.	자동제어설비

1)	일반사항

- 범례표 / 도면목록 / 장비일람표(용량, 수량, 시방, 기타사항 등)

- 기자재 명칭 및 개별 식별번호 포함

2)	배치도 / 계통도 / 입상도 / 평면도 / 상세도 / 기타

- 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 배관 / 케이블 / 시스템 계통도 및 입상도

- 타 설비와의 간섭사항 및 책임한계

- 배관 / 장비 / 작동(제어) 등 세부 계통도

- 설치 상세도 / 현장제어반 결선도(별도 성과물로 제출)

- 기타 필요한 사항

차.	토 목 /조 경

1)	조경계획 평면도  2)	수목이식 현황도	3)	이식수목 식재계획도
4)	조경식재 계획도  5)	조경시설물 공사계획도  6) 토목 마감도

카. 신재생에너지 설비 (필요 시)

1)	일반사항

- 범례표 / 도면목록 / 기자재 명칭 및 개별 식별번호(Tag No.)

- 기계기구 일람표(수량, 용량, 시방, 기타사항)

2)	신재생 에너지 설비도

- 신재생에너지 구조물 평면도 및 단면도

- 전력/기계 기기 배치도

- 전력/기계 간선 계통도(계통연계)

5.2.15	조감도

가.	조감도는 3차원 Computer Graphic으로 제작하여 도판과 이미지 파일을 함께 제출한다.

나.	“계약상대자”는 업무현황 보고 등 설계 설명을 위하여 투시도 등을 작성하여 제출해야 한다. 투시/조감위치, 수량 및 방향 등 제반 사항은 “공사”와 협의하여 결정한다.

5.2.16	색채 및 인테리어 디자인 계획(설계설명서에 포함)

가.	내․외부 자재의 색채 및 인테리어 디자인 기본계획을 도면 및 설계 설명서에 포함하여 표시하고 주요 마감재는 협의하여 견본을 제출한다.

나.	설치위치 별 컨셉, 디자인 시안 및 실시 설계안을 계획하여 제출한다.

다.	Signage는 Prototype 상세를 작성하고 세부 표기 내용을 작성하여 제출한다.

라.	가구집기류 상세를 작성하고 세부 표기 내용을 작성하여 제출한다.

마.	공사 시 임시 운영 사이니지 계획에 대해서 검토 및 작성하여 제출한다.

5.2.17	건설공사 공정계획서  / 공사지원 계획서

가.	건설공사 예정공정표를 작성한다.

- 대상시설에 대한 각 시설 및 공종별 세부공정표 작성

나.	우기․동절기, 주 52시간 근무에 따른 야간공사 등 공사 중지 기간을 충분히 고려하여 공사 기간을 산정해야 한다.

5.3	제출도서 목록

5.3.1	제출자료 목록(부수 및 형식 협의조정 가능)

번호	항 목	규격	부수	제출시기	비 고
1	착수계	A4	2	계약후 7일이내	서신문서
2	과업수행계획서	A4	2	계약후 20일 이내	성 과 물
3	계약상대자종합공정표	A3	2	계약후 20일 이내	서신문서
4	ISSUE PAPER - Ex.) 기획설계 내용 검토 등	A4	2	발생시	서신문서
5	인․허가등 행정절차 이행서류	A4	2	발생시	서신문서
6	각종 심의․자문서류	A4	2	발생시	성 과 물
7	공정보고(주간보고)	A4	전자파일	매주 월	서신문서
8	공정보고(월간보고)	A4	1	매월 5일	서신문서
9	투시도, 조감도 등	A1 / A2	5컷 (공항공사와 협의)	발생시	이미지
10	기타 과업내용서 등에서 정한사항	A4	1	발생시	서신문서 등

※ 성과품의 세부 항목(내용) 및 제출시기는 분야별 담당자와 사전 협의해야 한다.

5.3.2	기본설계 성과품 제출목록(부수 및 형식 협의조정 가능)

번호	제 출 도 서		규격	부수/ 분야별	제출시기	비 고
1	설 계 설 명 서	본 설명서 (공사공정계획 포함)	A4	1	Rev. 0	분야별/ 패키지별 제출
2	구조 설계서		A4	1
3	소요면적계산서		A4	1
4	공사비내역서		A4	1
5	기본설계 Issue Paper		A4	1
6	기타 과업내용서에서 정한 사항		A4	1
7	분 야 별 설계도면	복 사 도 (백도)	A2 (A3)	0 (1)
8	분 야 별 전자파일	도면전자화일 (CAD,PDF)	CD	1
		문서/ 각종 설계도서	CD	1

※ 성과품의 세부 항목(내용) 및 제출시기는 분야별 담당자와 사전 협의해야 한다.

5.3.3	실시설계 성과품 제출목록(부수 및 형식 협의조정 가능)

번호	제 출 도 서		규격	부수/ 분야별	제출시기		비 고
					Rev.A	Rev.0
1	설계설명서		A4	2	●	●	분야별/ 패키지별 제출
2	구조 설계서 (필요시 가설구조체 포함)		A4	2	●	●
3	에너지절약계획서(필요시)		A4	2	●	●
4	공사비 내역서(EMS 파일 포함)		A4	2	●	●
5	단가산출서		A4	2	●	●
6	수량산출서		A4	2	●	●
7	공사시방서(또는 구매규격서)		A4	2	●	●
8	분야별 설비계산서		A4	2	●	●
9	시설물유지관리지침서		A4	2	●	●
10	마감자재 검토보고서		A4	2	●	●
12	분 야 별 설계도면	복 사 도 (백도)	A2 (A3)	1 (3)	●	●
13	분 야 별 전자파일	도면전자화일 (CAD,PDF)	CD	1	단계별 및 최종(Rev. 0)
		문서/ 각종 설계도서	CD	1	단계별 및 최종(Rev. 0)
14	건설공사 공정계획서 / 공사지원 계획서		A4	2	●	●
15	관련 법규 검토 보고서		A4	2	●	●
17	소요면적 계산서		A4	2	●	●
18	기타 과업내용서에서 정한 사항		A4	2	●	●
19	준공자료(기록)이관계획서		A4	2	●	●

※ 성과품의 세부 항목(내용) 및 제출시기는 분야별 담당자와 사전 협의해야 한다.

5.3.4	기타사항

가.	상기 제출자료 및 성과물의 규격 및 부수는 “공사”와 협의 후 변경이 가능하며, “계약상대자”는 “공사”의 요청에 따라 별도의 공사발주용 설계 도서를 작성 제출해야 한다.

나.	투시도 및 조감도는 이미지 파일 별도 제출해야 한다.

다.	상세 공정관리계획은 별도로 과업수행 계획서에 포함하여 제출해야 한다.