「엄사면 공영주차타워 조성사업」

건축설계 과업내용서

2025.  04.

계 룡 시

목      차

제1장 총   칙	2

1. 과업명 / 2. 위치 / 3. 목적 / 4. 과업의 개요	2

5. 과업의 범위	4

6. 과업 준수사항	5

제2장 과업 일반사항	6

1. 과업수행의 방향	7

2. 설계자 업무	7

3. 관련 기관 인·허가, 심의, 자문 등 행정절차	9

4. 하도급의 범위	10

5. 설계변경	10

6. 각종 제출서류	9

7. 성과품 및 시방서 작성기준	13

8. 기타사항	14

제3장 분야별 설계지침	15

1. 일반사항	15

2. 분야별 설계지침	16

가. 건축분야	16

나. 토목분야	20

다. 설비분야	20

제4장 설계도서의 작성 및 납품	22

1. 제출도서 목록	22

2. 작성요령	23

※ 서식일체	34

제1장  총    칙

1. 과 업 명 : 엄사면 공영주차타워 조성사업

2. 위    치 : 계룡시 엄사면 엄사리 18-4번지 외 2필지

3. 목    적 : 계룡시 엄사면 일대 주차공급 부족 해소와 부지기능 강화를 위해 최적의 입체식 (주차타워) 주차장을 건립하고 주변 아파트단지 및 상점가 일대의 쾌적한 도로 환경을 조성하며, 지역의 랜드 마크 구성 및 주차타워의 이미지를 제고 하는 공영주차장 주차타워를 건립하기 위한 창의적이고 실용적인 설계안 도출.

4. 과업의 개요

가. 대지 면적 : 22,898.2㎡ (사업면적 10,454.4㎡)

도시지역, 제2종 일반주거지역, 자연녹지지역, 근린공원,                        가축사육제한구역

나. 시설 규모

1) 연면적 : 약 4,437.0㎡, 지하 1층 / 지상 2층

2) 주용도 : 자동차관련시설 (주차전용건축물)

※ 주차전용건축물의 경우 주차장으로 사용되는 용도에 맞도록 계획할것

3) 주요시설별 면적, 세부용도(안)

영역	세부시설	면적(㎡)	내용
시설별 면적표	주차장	4,109.43	주차장 (주차시설에 의해 주차할 수 있는 면적)
	관리사무실,CCTV실	103.25	관리실, 화장실,cctv
	계단실,ELEV	184.32
	통신실	5.0
	발전기실,펌프실	35.0
총 연면적		4,437.0

4) 건물 규모는 설계 과정에서 계룡시청(발주기관), 설계자(계약상대자)가 협의하여 조정할 수 있다.

다. 예정 공사비 : 7,596.900,000원 (부가가치세 포함) / * 총사업비 : 90억원

※ 공사비는 건축, 실내외장, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등에 대한 건립 공사비를 포함하며, 공종 간 배분하여 공사비 내에서 최적의 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

※ 건물 규모 및 공사비는 설계과정에서 발주기관과 계약상대자의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리비 등이 포함된 비용임.

라. 예정설계비 : 296,829,000원

(부가가치세, 손해보험료, 건축경관심의업무, 철거설계비 등 포함)

※ 해체공사 및 기타 심의, 인증, 평가와 인․허가 협의 등 목적물 완수에 필요한 제반 사항과 발주처가 요구하는 절차 등 일체의 비용을 포함한 금액은 설계 공모 전 내용 과 계획내용에 따라 본 계약시 재산정 예정

마. 과업내용

1) 계룡시 엄사면 일대 주차공급 부족 해소와 부지 기능 강화를 위한 입체식      (주차타워) 주차장 건립공사를 위한 기본 및 실시설계

- 건축, 토목, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 부대토목, 조경 등

2) 각종 심의, 인·허가, 입찰, 계약 등 제반 행정절차 이행에 따른 협의 및 보고

3) 관련 도서 및 필요 도서 작성 및 기타 본 과업내용서에서 정하는 사항 등

바. 과업기간 : 착수일로부터 240일(8개월)로 한다. (공휴일 포함)

※ 단, 발주기관의 요구로 추가용역 발생이나 기타 설계자의 귀책 사유가 아닌 설계 기간의 연장 필요시 기간을 연장할 수 있다.

본 지침(가) [별표1]에 따른 공종별 설계단계별의 공사비 대비 설계기간은 다음과 같음한다

- 공종별 설계단계별(기본설계, 실시설계)의 공사비 대비 설계기간-

공종	계획/중간설계			실시설계
	100-500억	500-1,000억	1,000억 이상	100-500억	500-1,000억	1,000억 이상
건축	4.5월	7월	9.5월	7월	7.5월	8월
비고 1. 계획/중간설계, 실시설계의 기간은 관계기간 협의, 환경영향평가, 교통영향 평가 등에 소요된 기간을 제외한 기간임 2. 단순, 보통, 복잡 등에 따라 공종별 설계기간에 ±10%의 범위내에서 가중치를 적용할 수 있음 3. 실시설계시 기본설계를 함께 수행하는 경우는 업무내용을 고려하여 실시설계기간의 1.3～1.5배를 적용할 수 있음

(가) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침, 국토교통부

사. 공사기간 산정

본 사업과 유사한 규모시설의 사업추진 기간 분석 결과 평균 11개월이 소요되나, 본 사업 대상 시설은 사례시설 대비 규모가 작고, 엄사면 일대 주차공급 부족 및 상점가 일대의 쾌적한 도로 환경 조성의 시급성읅 감안하여 소요기간 설정

주차타워 유사 사례 사업추진 기간 분석

구분	하남시 지역현안사업2지구 주차빌딩	봉담2 공영주차장 건립공사
위치	경기도 하남시	경기도 화성시
규모	17,827.62㎡(지하1층~지상6층)	11,778㎡(지하0층~지상3층)
사업비	19,610,003,056 원	15,636,664,913 원
사업기간	착공일로부터 365 일	착공일로부터 300일
이미지

5. 과업의 범위

가. 본 과업은“엄사면 공영주차타워 건립공사 건축설계 공모”에 대한 건축설계 용역에 적용한다.

나. 본 과업은 발주기관과 수급인이 체결한 기술(설계)용역계약서에 의한 일체의 설계도서작성, 건축협의에 필요한 각종 구비서류 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출자료의 작성 등, 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

다. 설계도서는 공공 발주사업에 대한 건축사의 업무 범위와 대가기준 (국토교통부 고시) 별표2 기준 적용, 상급 도서를 납품받고자 하는 경우 별표4에 따른 상급 대가 요율을 적용하여야 하며, 중급 적용 시 납품 도서는 중급에 해당하는 사항으로 적용함.

라. 본 용역은 각 분야별[건축, 토목, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 부대토목, 건축 관련자문 등을 포함] 설계에 해당된다.

마. 녹색건축물인증, BF인증 등 「공공 발주사업에 대한 건축사의 업무 범위와 대가 기준」제5조에 따른 별도 업무는 제11조에 따라 별도 대가 반영한다

6. 과업 준수사항

가. 기본 준수사항

1) 용역수행자는 건축물의 배치, 규모, 형태, 색채, 재료, 건축설비, 구조 등에 대하여 기능, 안전성, 주변 경관(조화) 등을 감안 (참고)하여 최적의 미와 성능을 발휘할 수 있는 조형으로 설계하여야 한다.

2) 설계 납품 전에 관계 법령에 해당되는 모든 행정절차〔설계심의, 계약심사, 건축협의 등 사전절차〕이행 후 반영될 사항은 최종성과품에 반영 제출하여야 하며 이에 소요되는 모든 비용은 용역수행자 부담으로 수행하여야 한다.

3) 본 용역 설계 진행 중 각 분야별 (건축, 토목, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 부대 토목 등), 주관부서(건설 교통실)와 수시로 사전협조하여 용역성과품 품질향상을 위한 중간 검토(협의)를 받아야 한다.

4) 건축, 토목, 구조, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 부대 토목 등 전문분야는 등록된 국가기술 자격법에 의한 해당분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

5) 건축법시행령 제91조의3 (관계 전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계 전문기술자의 협력 사항)에 의한 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

6) 본 과업 용역 수행 중 필요시 관련 부서(기관)의 자문위원회 자문 또는 협의에 응하여야 하며, 협의 및 요청 내용에 대한 설계 반영사항을 날인 후 문서화하여 발주처에 제출하여야 한다.

※ 자문 및 협의에 소요되는 모든 제비용은 용역수행자 부담으로 한다.

7) 본 과업을 수행함에 있어 본 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주처와 협의하여 수행하여야 한다.

나. 부대업무

1) 본 과업의 수행과 관련한 각종보고회 개최 시 자료작성 및 보고에 따른 업무

(착수보고회, 중간보고회, 최종보고회 등)

2) 기타 각종 자료의 작성 및 기술제공 등 과업수행에 필요한 사항

3) 필요시 공청회 또는 설명회 개최에 따른 업무

4) 용역 완료 전까지 관련법에서 정한 보험 또는 공제증서의 제출

5) 계획/중간설계 및 실시설계를 위한 외부 자문 시 자문에 필요한 절차 이행

6) 공사과정(완료단계)에서 변경사항(용도, 면적 등) 발생 시 건축협의 승인(변경) 절차이행 및 준공도면(도서) 날인 및 건축물대장 작성 날인 제출과 세움터 처리 절차 대행

7) 기타 필요시 사례 비교조사 제출 및 본 사업 적용·반영 사항 등

다. 기타사항

1) 수급인은 과업의 목적, 건축물 규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 과학적이고 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 설계 용역 중(이후) 아래와 같은 사항 등으로 변경이 필요한 경우 서면질의 후 과업을 수행한다.

① 오폐수처리시설의 연결

② 예측 불가능한 지하매설물, 폐기물 등

③ 우수관 및 배수시설 확인

④ 설계나 계약내용의 누락부분 확인 시 설계서 재작성 등

⑤ 기타 과업수행에 필요한 사항

2) 본 과업은 자연환경을 보존할 수 있도록 계획, 설계, 시공이 되기 위한 자원(재료)의 효율적 활용, 폐기물 재활용공법 및 소요 공사비용 등을 면밀하게 검토, 제출한다.

3) 장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법 및 녹색건축인증에서 정한 기준으로 설계한다.

-녹색건축인증 및 BF인증 심의(예비인증)시 반드시 설계담당자는 발주부서와 함계 참석하여 편의시설 설계에 대한 세부적인 사항에 대하여 답변하여야 하며, 보행구간 및 접근로 등은 인증기준에 적합하게 조성될 수 있도록 계획 하여야 한다.

- 장애물 없는 생활환경(BF)인증에 관한 사항을 반영 하여야 한다.

4) 본 과업내용서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항, 건축법 등 관련 법률 등이 없는 한 본 과업내용서를 원칙으로 하고, 이의가 있을 시는 서면질의에 의하여 확인 후 수행한다.

제2장 과업 일반사항

1. 과업수행의 방향

가. (과업내용서 준수) 본 과업내용서는 일반원칙을 제시한 것으로 관련 법규, 조례 등과 발주기관의 별도의 지시사항이나 특기사항이 없는 한 본 과업내용서에서 제시한 내용을 원칙으로 한다. 단, 이의가 있을 경우 계약상대자 임의로 판단해서는 안 되며 발주기관과 협의 확인 후 수행한다.

나. (추정공사비 준수) 계약상대자는 과업 개요에서 제시한‘추정 공사비’내에서 설계가 진행될 수 있도록 과학적이고 합리적인 방법으로 과업을 수행한다.

다. (신기술 등) 신기술, 신공법, 특정 공법이나 제품 등을 설계에 반영하는 경우에는 용역과업 진행 시 효과, 시공성, 경제성, 적용사례, 유지관리상의 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 필요시 자문회의 또는 건설기술심의위원회나 건설신기술 활용심의위원회 심의ㆍ자문을 받아 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 설계에 반영하도록 하고 그 보고서를 작성하여 발주기관에 제출한다.

라. (장애인 편의시설) 「교통약자의 이동편의 증진법」, 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」등에 적법하게 설계하여야 하며, 건축물 준공 前 장애인 시설의 인·허가와 관련하여 관련 기관과의 사전 업무협의를 실시하여 건축물 인·허가 시 문제가 발생하지 않도록 한다.

마. 계약상대자는 발주기관이 예측할 수 없었던 상황이 발생할 경우 즉시 발주기관과 협의 후 과업을 수행한다.

2. 설계자 업무

가. (기본 업무) 계약상대자는 주어진 과업의 효율적인 달성을 위해 해당 공사에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가진 인력의 배치와 과업의 목적, 범위, 공정, 자금 등 사업계획을 세워 최상의 설계가 되도록 해야 한다.

나. (계약내용 준수) 계약상대자는 발주기관의 승인 없이 과업의 범위·내용 등을 임의로 변경할 수 없고, 발주기관이 필요하다고 지시하는 각종 조사자료 수집 및 시험을 하여야 하며, 관련 소요 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

다. (설계도서 작성) 건축, 토목, 기계설비, 전기설비, 정보통신설비, 소방설비 등 공종별로 분리하여 설계서를 작성하되, 세부 설계내용이 서로 상충하지 않도록 한다.

라. (안전 및 품질 관리) 건설기술진흥법, 산업안전보건법 등에서 정하는 바에 따른 업무를 수행하여야 하고 법령에서 정하는 바에 따라 필수 안전관리비용 등을 내역서에 반영한다.

마. (공사 공정표 작성) 설계자는 건축물의 규모, 공법, 여건, 특성, 공사기간 부족으로 인한 안전사고 가능성 등을 종합적으로 고려하여 적정한 공사기간을 산정하여야 하고, 관련된 공정표를 제출하여야 한다.

바. (기록 및 보안 관리) 설계자는 현지 과업수행기록을 유지하고 이를 제출하여야 하며, 설계자는 과업수행 중 또는 설계 성과물 제출 후에도 설계내용에 관하여 일체의 보안유지에 책임을 진다.

사. 책임 및 하자

1) 계약상대자는 제출한 설계도서의 일체에 대한 책임이 있으며, 시공 도중 설계도서가 현장에 부합되지 않을 경우 발주기관의 요구에 따라 현지조사 및 시험을 시행하고, 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.(설계단계에 시행한 지반조사 결과와 실제 현장여건의 상이에 따른 추가 지반조사 및 설계변경 등 포함)

2) 설계과정에서 합리적인 이유 없이‘추정공사비’기준을 초과하는 경우  부실벌점, 부정당제재 등의 불이익을 받을 수 있다.

3) 최종 설계도서 납품 후 설계의 부실·불완전에 따른 하자, 공사비의 과도한 증액 발생 등의 경우에는 발생한 모든 손해비용, 기간 등에 대하여 배상하여야 할 민·형사상 책임을 지며, 건설기술진흥법 제53조 및 동법 시행령 제97조 등 관련법규에 따라 용역업자 및 용역참여기술자에 대하여 부실벌점, 부정당제재 등의 불이익을 받을 수 있다.

아. (납품 및 검수) 최종 실시설계도서는 발주기관이 충분히 검수할 수 있도록 계약납품 7일 전에 제출하여 사전 검사를 받아야 하며, 수정 또는 변경사항이 있을 경우에는 즉시 조치하여 계약 납품일까지 납품한다.

자. (계약의 해제·해지 또는 일시정지) 용역수행 중 다음의 해당하는 경우에 발주기관은 당해 계약의 전부(일부)를 해제·해지 또는 일시정지 할 수 있다.

1) 정당한 이유 없이 약정한 기일을 경과하고도 용역을 착수하지 않을 경우

2) 계약의 수행 중 뇌물수수 또는 정상적인 계약관리를 방해하는 불법·부정행위가 있는 경우

3) 정당한 사유 없이 발주기관의 지침에 따르지 않고 설계자 단독의 주장만 내세워 과업 수행의 지장을 초래한다고 판단될 경우

4) 계약상대자의 귀책사유로 계약 내용 및 조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 설계용역 계약의 목적을 달성하지 못하거나 달성하기 어렵다고 인정될 경우 [용역기간 초과, 공사비 초과, 인·허가 차질 등]

5) 계약서 및 과업내용서(계약체결 후 제시하는 제반 자료 포함)와 발주기관의 정당한 지시를 계약상대자가 고의 또는 임의로 이행하지 않을 경우

6) 기타 발주기관의 사업계획 변경 등 불가피한 사유가 발생한 경우

차. (설계도서 보완·수정) 완성된 설계도서 중 제반법규 및 규정에 지적되는 상황이 발생할 시에는 이의 없이 보완·수정하여야 한다.

카. (기타 사항) 별도의 계약조건 및 용역계약 일반조건에 의하며, 여기에 명기되지 아니한 사항은 관계 법률, 지침 등에 의하되 법률에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 정한다.

3. 관련기관 인·허가, 심의, 자문 등 행정절차

가. 계약상대자는 최종 설계도서 납품 前 관련법규에 의한 관계기관 수속, 허가 등은 발주기관을 대행하여 완료하고 그 결과를 반영한 성과품을 납품하여야 하며, 이와 관련된 일체의 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

나. (각종 행정절차) 계약상대자는 본 과업수행 기간 중 발주기관이 실시하고자 하는 각종 심의, 검토, 자문회의 등에 필요한 자료 준비와 협조를 하여야 한다.

(지자체 건설기술심의, 건축심의, 디자인심의, 건설기술자문회의, 설계의 경제성검토, 설계의 안전성 검토, 굴착심의, 구조안전 심의 등)

다. (심의결과 보완) 각종 심의 등 지적사항에 대해 검토 후 반영 여부를 발주기관에 제출하여 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 한다.

라. (관계기관 협의) 계약상대자는 과업수행 前 대지 내ㆍ외 지하지장물의 철거 및 이설(도시가스, 상·하수도 등) 및 도시가스의 공급 가능 여부, 전기·전화 공급지점 등을 계약상대자의 책임 하에 관련기관(또는 관련부서)과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의한 결과를 발주기관에 보고하여야 한다.

마. (관급자재 선정) 관급자재 발주계획 및 사전검토, 발주 등 업무를 적극 지원한다.

바. (설계자문회의) 발주기관이 기타 설계사항에 대한 설계자문위원회를 실시할 경우 필요한 자료 준비 및 협조를 하여야 하며 자문내용 반영여부는 발주기관과 협의하여 정한다.

사. (기타 사항) 본 과업수행 기간 중 상기 내용과 별도로 발주기관이 필요하다고 판단할 경우 관련 절차를 추가로 검토할 수 있으며, 이에 대한 과업은 계약상대자가 준비하여야 한다.

4. 하도급의 범위

가. 계약상대자는 도급받은 설계용역을 제3자에게 일괄 하도급 할 수 없다.

나. 계약상대자는 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 용역업무 착수 시 하도급 내용을 발주기관에 제출하여 승인을 득하여야 하며, 하도급과 관련된 당해 업무에 대하여 모든 책임을 진다.

다. 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

1) 현황측량, 지반조사 및 지장물조사 등 작업

2) 전문 원가계산 검증업무(행정자치부 등록기관)

3) 건축 구조 및 가설 구조[흙막이 가시설, 비계, 동바리 등], 토목 구조, 기계설비, 통신, 전기 등 전문 분야 업무

4) 각종 공사 내역서 작성[수량산출, 단가산정 등]을 위한 업무

5) 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

5. 설계변경

가. 설계변경 대상

1) 상위계획 또는 발주기관의 계획변경으로 인한 과업범위 변경

2) 각종 심의, 검토 등 관계 기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경

3) 계약상대자 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

4) 기타 발주기관의 판단에 따른 설계변경 필요시

※ 계약상대자는 위 설계변경 시 이를 수용하여 용역을 수행해야 함

나. 계약금액 조정

1) 설계자는 발주기관의 사업계획 변경[사업규모 등]에 따라 설계과정 중에 발생하는 건축연면적 증가, 과업내용의 경미한 변경, 과업기간 연장 등의 사유로 설계용역비 증액을 청구할 수 없다.

2) 설계변경[계약내용 변경 등 포함]의 경우 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”, “용역계약 일반조건 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정”에 의거 계약서상 ｢용역비 산출근거｣ 및 ｢공공 발주사업에 대한 건축사의 업무범위 및 대가기준｣에 따라 발주기관과 협의하여 정산할 수 있다.

다. 계약금액 조정 대상 제외

1) 법규, 지침 위반, 추정공사비 초과 등 설계자의 설계오류에 의한 과업

2) 사용자협의, 대안 수립 등 설계과정상의 조정, 검토를 위한 과업

3) 색채,  사업명칭 디자인 등 도면이 아닌 보고서 형태로 표현된 용역

4) 인·허가 추진 및 승인조건 이행을 위한 과업

5) 설계 목적을 달성하기 위하여 발주기관이 설계내용 변경 또는 수정, 추가 수량산출, 내역서 변경작업 등을 요구하는 과업(설계자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며 지체없이 이를 이행하여야 한다)

6. 각종 제출서류

가. (착수 서류) 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 발주기관에 착수계 등의 아래 서류를 작성·제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

1) 착수계

2) 과업수행계획서

① 참여기술자 조직도

＊ 전문 원가계산 업체, 공법, 기술지원 전문업체 등이 포함된 실질적인 관련주체의 조직도 작성

② 각 분야별(건축, 전기,소방 등) 업무와 책임

③ 총괄 및 분야별 책임기술자 선임계

a. 공인기관[각종 전문협회 등]에서 발행하는 경력증명서 원본

b. 재직증명서 및 국가기술자격증 사본

④ 단계별 용역수행 계획

⑤ 참여기술자 보안각서(반드시 참여기술자 본인의 자필서명)

⑥ 설계용역 예정공정표

⑦ 추정공사비를 고려한 설계운용계획(Design to Cost)

a. 추정공사비 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 한다.

b. 시공단계에서 발주기관이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액 의 발생, 공사기간의 연장, 설계의 부실 등의 문제가 발생하지 않도록 계약상대자는 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

c. 설계 지침상 친환경적 계획요소로서 자원의 효율적 활용 등 설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 대안을 작성하여 소요 공사비용을 면밀하게 검토, 제출하여야 한다.

d. 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

3) 하도급 승인(예정) 신청 등 기타 발주기관의 승인이 필요한 사항

4) 설계용역에 필요한 서류, 관련 법규 및 지침에서 정하는 제출서류 등

나. (단계별 제출서류) 계약상대자는 설계용역 예정공정표의 완료일 이전에 각종 서류를 작성·제출하여 발주기관 검토 확인 후 결정한다.

1) 계획설계(중간설계) 및 실시설계 결과서류, 기성검사원 등

2) 과업내용서와 관련된 제반법령 및 조례 검토서

3) 건축협의, 허가 및 각종 인증에 필요한 각종 서류 등

다. (공정 보고) 계약상대자는 과업수행계획서의 설계용역 예정공정표를 기준으로 공정보고서를 작성하여 발주기관에 제출한다.

1) 월간공정보고 : 제출일정 별도협의

2) 수시보고 : 발주기관 요청 시 설계진행 사항 보고

라. (기타 서류) 과업 중 발생하는 문제점 및 대책방안, 업무협의 결과보고 등

7. 성과품 및 시방서 작성 기준

가. 성과품 적용기준

1) 본 설계용역의 성과품은 국토의계획및이용에관한법률, 건축법, 건설기술관리법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법률, 주차장법, 도시교통정비 촉진법, 환경영향평가법, 도로법, 하수도법, 수도법, 공중화장실등에관한법률, 에너지이용합리화법, 신에너지및재생에너지개발.이용.보급촉진법, 다중이용시설등의실내공기질관리법, 집단에너지사업법, 도시가스사업법, 지적법, 건설산업기본법, 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법, 건축사법, 국가기술자격법, 엔지니어링기술진흥법, 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률, 전파법, 소방시설공사업법, 시설물의안전관리에관한특별법, 장애인.노인.임산등의편익증진보장에관한법률, 전기용품안전관리법, 조달사업에관한법률과 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업과 관련 있는 관계법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

2) 설계도서의 작성방법은 건설기술관리법 제23조의2(설계도서의 작성 등)건설기술관리법시행규칙, 제14조의2(설계도서의 작성), 제14조의3(설계도서의 검토), 건설교통부고시(설계도서 작성기준, KSF1501:건축제도통칙, KSF1505:건축구성재의 기본공차 및 치수정하기 등) 관련규정에 의하고, 기타 설계기준은 국토해양부제정 공공건축물의 설계도서 작성기준을 적용한다. 설계도서 작성 중 이의가 있을 때는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

나. 시방서 작성 기준

1) 공사시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장 조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제할 필요가 있을 때 전문시방서를 작성하며, 전문시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

2) 표준시방서는 건설교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 작성한다.

3) 전문시방서는 자재관련시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격 품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

8. 기타사항

가. 본 과업에 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며 교체가 불가피한 경우에는 발주처의 승인을 받아 교체하여야 한다.

나. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 일반사항을 규정한바 이에 규정되지 아니한
사항은 관련 법령과 각종 시방서에 의거 발주처와 협의하여 수행하여야 한다.

다. 본 용역수행자는 과업완료 후에도 본 과업과 관련하여 필요시 자문에 응하여야 한다.

제3장 분야별 설계지침

1. 일반사항

가. 공영주차장 운영에 따른 주차대수 최대 확보 및 원활한 주차동선을 위한 효율적인 설계(인근 주차난 해소를 위하여 주차장을 확보하기 위한 목적으로 건립되는 건축물로 인근 주민들의 차량 운행 및 이동의 편의 제공이 우선 고려사항임)

나. 교통이 혼잡한 지역에 위치한 주차시설로서 인근 자동차와 보행자의 교통에 미치는 지장을 최소화할 수 있도록 출구와 입구를 설치하여 동선계획을 수립하고 건축물 및 도로의 활용성, 경제성, 안정성을 극대화할 수 있도록 계획한다.

다. 경제적이고 독창적인 외관 조형을 통해 주차 타워 형태의 외관을 지양하되, 주변 경관과 어우러져 도시미관을 해치지 않도록 계획한다.

라. 주차장법, 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 계룡시 조례 등 주차장 설치와 관련된 법령 및 제반 규정에 적합하도록 계획한다.

마. 시설물에 대한 이용자의 편의성과 관리자의 관리 운영에 관한 사항을 면밀하게 검토하고 특히 교통약자에 대한 충분한 배려가 있도록 계획한다.

바. 각종 재난·재해 시 안전하고 원활한 피난이 가능하도록 계획하고 불의의 사고에 적절한 대처가 가능하도록 계획한다.

사. 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 및 내진·내화구조, 유지관리 문제를 고려하여 각종 시설의 활용성, 효율성, 기능성, 전문성을 확보하고 기능을 극대화하도록 계획한다.

아. 총 공사비는 부가가치세를 포함하여 추정공사비 이내로 계획하여야 하며, 반드시 개략 공사비 등을 구체적으로 산정하여 공사비가 초과하지 않도록 확인한 후 계획하여 제출하여야 한다.

자. 정상적인 공정을 방해하거나 공정 지연이 발생할 수 있는 건축 재료 또는 기타 요소를 배제하고, 친환경·고효율 자재를 설계에 반영한다.

2. 분야별 설계지침

가. 건축 분야

1) 시설별 면적, 용도 등

① 주요시설별 면적, 세부용도

영역	세부시설	면적(㎡)	내용
시설별 면적표	주차장	4,109.43	주차장 (주차시설에 의해 주차할 수 있는 면적)
	관리사무실,CCTV실	103.25	관리실, 화장실,cctv
	계단실,ELEV	184.32
	통신실	5.0
	발전기실,펌프실	35.0
총 연면적		4,437.0

② 건물 층수, 층별 구성, 연면적은 개략적인 규모추정을 위해 산정한 면적으로 설계자의 제안 내용에 따라 변경 가능하다

③ 관리사무실은 요금정산원·청소 및 시설관리를 포함한 2인의 운영인력이 교대 근무(주차장 24시간 개방)로 사용하도록 화장실, 숙직실 포함 계획하고 주차 관제장비 설치를 고려하여 계획한다.

④ 화장실, 계단실, 엘리베이터 등 공용부분은 관련 법규와 시설 규모를 고려하여 이용자 편의를 도모할 수 있도록 계획하며, 엘리베이터는 2대 이상 설치한다.

⑤ 주차 여유 면수 감지 시스템  설치 검토 및, 방재 센터 관련 시스템설치 (무인운영 대비) 검토하여 계획한다

⑥ 범죄예방설계 (CPTED) 적용을 검토하여 계획한다

2) 배치계획

① 계획 시 시설의 용도, 규모 및 입지조건 등을 충분히 파악하여 효율적인 대지의 이용에 적합한 계획이 되도록 하고, 계획/중간설계 단계에서 다음 사항에 특히 주의하여 주변 환경과 조화된 경관이 형성되도록 노력한다.

a. 지역 문화·자연적 환경 및 계획시설 부지와 주변지역성에 대한 배려

b. 이용자의 접근성 및 유입유도 등을 고려한 외부 공간 계획

c. 차량의 진출입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선체계를 확립하고, 교통약자가 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획

②  배치계획 시 부지의 이용을 극대화하며 시설의 용도 및 지역의 필요성에 따라 적절한 외부주차 공간의 확보와 주차타워 전면 공간의 활용 등의 배치에 노력한다.

3) 평면계획

① 주차장 이용목적 및 특성에 적합하도록 계획하고, 특히 지상 1층 사무실은 향후 주차장 운영방식 변경으로 인한 전산장비 비치 등 가변성에 대처할 수 있도록 하되, 쾌적하고 밝은 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

② 이용자들의 이용에 불편함이 없도록 공간구성 및 동선계획이 효율적이어야 하며 내·외부 출입구와 그 주변에서 혼잡이 없도록 한다.

③ 공용부분(화장실, 계단실, 엘리베이터 등)은 설계자가 건축법 및 관련 법령 등에 맞게 설계해야 하며, 공용부분을 계획하고 남은 면적은 설계자가 해당 부지에 건축될 수 있는 용도의 실 등을 제안하여 설계할 수 있다.

④ 최소 193대(장애인주차 포함) 이상 최대한 많은 주차대수를 확보할 수 있도록 실효적인 안으로 설계자가 제안하되, 주차장법 등 관련 법규에 적합하도록 계획한다.

4) 입·단면계획

① 건축물 외부의 설계와 재료 마감은 건축물 형태 및 주변 경관과 조화로워야 하며, 영구적·내구적이고 개보수 시 기존 재료와의 일치를 고려하여 보수가 용이 하도록 설계한다.

② 주차장 관련 법규, 설비시스템, 등을 고려한 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간으로 계획하고, 이용자의의 수직·수평 이동에 불편이 없도록 계획한다.

③ 주차타워 입면은 향후 옥외광고물 설치를 고려하여 계획한다.

5) 동선계획

① 동선계획은 자동차의 이동동선, 주차장 및 이용자의 보행동선, 주차장 관리상의 동선 등을 고려하여 동선 간의 교차지점이 적으며, 이용자 중심의 안전하고 원활한 이용이 가능하도록 아래 사항에 대해 충분히 검토하여 계획을 수립한다.

- 보행 동선과 자동차의 교통 동선의 교차는 가능한 한 피한다.

- 보행자도로 및 인근지역에서의 접근이 용이하도록 계획 한다.

- 주차 관리원과 일반 이용자의 동선은 분리하는 것을 원칙으로 한다.

-  주차장의 출입구는 주변의 도로 상황·교통 상황·토지 이용 상황 등을 고려하고, 보행자의 안전과 주변 도로의 교통 흐름에 영향이 적게, 동시에 원활한 출입이 가능하도록 배려하여 계획하여야 한다.

5) 경관계획

① 건축물의 용도에 부합되며 건축법 및 관련 법률, 조례 지침에 적합하게 계획한다.

② 외부 조형은 기존 주차전용건축물의 전형적인 이미지에서 벗어나 독창적인 외관 조형을 통해 미관상 아름답고 주변 경관과 조화를 이루도록 계획한다.

③ 색채계획은 기본경관계획 등 관련 계획 및 지침에 따라 계획한다.

④ 조명계획은 야간경관과 환경적 영향을 고려하고, 향후 용이하게 관리할 수 있도록 계획한다.

6) 구조계획

① 구조설계기준은 다음 기준을 적용하여야 하며, 국내 기준에 규정되지 않은 사항에 대해서는 외국 기준을 준용할 수 있다.

a. 적용규정

- 건축법 및 시행령

- 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토교통부)

- 국토교통부 고시 건축구조설계기준

- 콘크리트 구조 설계기준 및 해설(한국콘크리트학회)

b. 적절한 구조와 하중을 고려한 층별 배치계획

c. 내진설계 기준에 적합하게 설계

d. 경제적인 구조

e. 차량, 장비 등으로 인한 바닥하중 및 진동을 고려하여 향후 처짐, 균열 등으로 인한 건물의 기능이 저하되지 않도록 설계할 것

f. 대지의 지질조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조로 계획.

② 내진 안전성의 확보

a. 시설의 재해 시 기능 및 지역적 조건에 따라 건축구조, 설비 및 비(非)구조 부재의 종합적인 내진 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

b. 지진 등의 재해로부터 시설이용자의 생명 및 재산의 보호를 도모해 2차 재해를 방지해야 한다.

c. 건축물로서의 내진 안전 성능은 건축 구조[구조체], 건축 설비[전기 설비, 기계 설비] 및 건축 비(非)구조 부재[구조체를 보호하거나 건축물이 공간, 환경을 구성하는 구성 부위와 그 구성 요소로서 외벽 및 그 마감재, 창 등의 개구부, 칸막이 및 내장재, 천정 및 바닥재, 가구 및 사무기기]가 종합적으로 조화를 이루도록 되어야 한다.

7) 주차계획

① 겨울에 주차장 기능을 유지하기 위하여 출입구 주변에 제설, 동결 방지 등에 대한 대책을 강구하여야 한다.

② 주차타워에는 우천 시에 주차타워 내부에 우수 등의 유입이 되지 않도록 하고, 필요한 유수 방지 대책을 강구하여야 한다.

③ 주차장에는 필요에 응하는 관리용 시설을 설치하여야 한다.

8) 부대시설 설치계획

① (표지체계) 필요에 따라 시설의 이용에 편리하도록 표지 체계를 설계하되, 일반용과 장애인용, 경차전용으로 구분하여 계획한다.

② (안전시설 등) 출입구 경광등, 반사경, 안전표식(마감자재, 색채계획) 등 안전시설물 배치계획을 적절히 수립하여 주차장 진·출입 시, 주차장 내부 등에서 안전사고가 발생하지 않도록 계획하고, CCTV를 설치하여 사각지역이 발생하지 않도록 계획한다.

③ (옥외 게시판 등) 필요에 따라 도로에서 쉽게 볼 수 있도록 옥외 전광판, 간판 및 현수막 등을 설치할 수 있는 장치를 적절한 위치에 계획한다.

9) 화재에 대한 안전성 확보

천장 및 벽체 등의 내장은 불연 또는 준불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 피난 경로는 간명하게 한다.

나. 토목분야

1) 인접대지의 건축물 지반·도로, 인명 등에 피해가 발생하지 않도록 지반 및 지질상태, 지하구조물·매설물 등을 면밀히 분석·검토하여 가장 적합한 토목설계를 적용하여야 하며, 공사 진행 중 본 사업장으로 인해 발생할 수 있는 주변 피해를 방지하기 위하여 관련 법규에 따라 필요 비용 등도 설계에 반영함으로써 인접대지 및 건축물의 피해와 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 인근건축물 및 아파트에 피해가 발생되지 않도록 적절한 가시설, 기초, 토공사 계획을 반영한 설계를 통해 실제 공사발주 시 사업비가 초과되는 일이 없도록 계획하고, 굴착공법, 지보공법, 차수공법 등의 각종 공법은 안전성, 경제성, 시공성, 환경성 등을 종합적으로 검토하여 과도한 설계가 되지 않도록 한다.

3) 상·하수도 계획은 기존 상·하수도시설과 연계성 검토하여 설계토록 하고 대지 내 오수처리에 대하여 설계하여야 한다.

4) 성토 및 사토 물량이 최소화되도록 계획하고, 성토 및 사토가 필요한 경우에는 주변의 토취장 및 사토장 현황을 조사하여 가장 합리적인 장소를 설계에 반영하여야 한다.

5) 토목공사 중 굴착·발파로 인해 주변 건물 및 주민에게 미치는 영향[소음 및 진동 등]을 고려하여 그 피해를 최소화할 수 있는 공법 및 방안을 강구하여 설계하여야 한다.

다. 설비분야

1) 주차장을 안전하고 합리적으로 운영하기 위해 기계, 전기, 통신 설비가 연계된 통합 운영체계 구축할 수 있도록 설계에 반영한다.

2) 차량의 원활한 진출입 및 주차, 안전감시를 위한 중앙통제시스템 설치를 통해 안전성, 편리성을 확보할 수 있도록 계획한다.

3) 각 분야 설비는 건축물 용도 및 기능을 고려하고, 에너지 절감, 경제성, 운영성, 유지관리 등을 종합적으로 검토하여 적합한 설비를 적용한다.

4) 건축, 토목, 전기, 구조 등 타 공사(공정)와 연관되는 부분을 면밀하게 검토하여 설계에 반영하고, 원활한 시공 및 기능을 유지토록 하여야 한다.

5) 설비공간은 향후 장비교체, 유지관리 공간 등을 충분히 고려하여 위치, 면적, 층고 및 장비 반입구를 확보하여야 한다.

6) 소화기, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 상수도소화용수설비, 제연설비,  연결송수관설비, 급배기설비, 공기조화설비를 포함한 주차장에 필요한 설비를 완벽하게 갖추도록 계획한다.

7) 차량 통행 시 시선확보 및 안전을 고려하여 충분한 조도를 확보할 수 있도록 계획한다.

8) 정전에 대비한 충분한 용량의 비상 발전시설 확보를 고려한다.

9) 환기계획은 에너지절약형으로 환경 친화적인 시스템을 적극 도입하고, 자연환기·기계환기·절충방식을 비교 검토하여 최적의 환기시스템을 선정하여 계획한다.

10) 주차관제설비와 감시카메라(CCTV)설비는 편리한 주차, 사고감시, 사고기록저장, 유지관리 등을 위해 카메라, 센서 등을 활용하여 사각지대가 없도록 계획한다.

제4장 설계도서의 작성 및 납품

1. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

(1) 예비검사

계약상대자는 설계 용역 준공예정일 10일전에 납품목록 및 최종성과품에 대한 원고 1부씩(공종별)을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

(2) 작성기준

계약 상대자는 성과품 작성기준에 의거 성과품을 작성하여 제출한다.

(3) 설계도서 작성기준

① 계획/중간설계 및 실시설계 도서의 작성은 설계용역관리편람 건축분야

성과품 작성기준과 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2016. 12. 30. 일부개정에 의거 설계도서를 작성하여 성과품을 제출한다. 그리고 내역서 작성은 최종 설계도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 물량 등의 착오가 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 모든 도면은 CAD System을 이용하여 전자화된 형태로 작성하되 건설CALS/EC 전자도면 작성표준(건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조)에 따름

(4) 엔지니어링산업 진흥법 제27조(설계도서의 등의 서명날인)에 따라 모든 설계 참여자(사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 날인할 것

(5) 계약상대자는 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주부서의 승인을 득한 후 실시한다.

(6) 기타

① 시공상세도 작성지침에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 하며, 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사 시방서에 명시해야 함

② 시공상세도 작성비용은 엔지니어링 사업대가 기준에 따라 산정하여 포함하여야 한다.

③ 산업안전 보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용)를 계상한다.

④ 안전관리비를 잠정금액(Provisional Sum, PS단가)으로 설계 내역서에 포함하여 작성

⑤ 공사예정공정표 : 우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 인한 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리 전문가 참여하여 적정 공사 기간 산정

2. 성과품의 작성

1) 설계보고서

(1) 보고서는 제출문과 참여기술자 명단(별첨 3양식)을 수록한다.

(2) 발주부서의 지시사항, 설계자문회의 검토사항, 각종 심의 사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계 반영 내용과 설계의 경제성 등 검토 결과 등을 보고서에 부록으로 삽입한다.

(3) 기타 보고서의 작성순서, 편집방법 등은 인쇄 전에 발주부서와 사전협의 후 시행한다.

2) 설계 설명서

(1) 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.

(2) 건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 차량, 보행자 동선 등에 관한 동선계획

(3) 기계분야 : 주요설비, 냉․온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, 친환경 설계내용, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

(4) 전기분야 : 전력간선, 전등전열 기타 관련 설비, 전기 및 전화설비 공급 방법, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 친환경 설계내용, 세부공정 계획, 세부공사비 산정, 친환경 설계내용 등

(5) 통신 분야 : 통신선로, 방송설비, 감지설비, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

(6) 토목 분야 : 지반조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 골재원 및 사토장 선정 , 배수처리계획(공사중계획 포함), 신기술.신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 구조물의 기초공법의 검토, 장기침하 대책공법, 공사비 산정 등

(7) 조경 분야 : 식재 및 시설물 계획, 옥상조경계획, 수목이식계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획 등

3) 각종계산서

(1) 해당 건축물 내 구조계산서(건축,토목), 전력부하계산서, 조도계산서, 간선 전압강하계산서, 각종 용량계산서(변압기, 비상발전기, 개폐기 등), 냉난방 부하계산서, 기계설비용량 계산서, 에너지 절약계획서 등을 포함한다.

(2) 물량산출서

① 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공종별로 집계표를 작성하여야 한다.

② 공종별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부 하여 제출한다.

4) 설계도면

(1) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

(2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다

(3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

(4) 설계도면에는 주석(Note)난을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

(5) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들 번호 및 도면명을 표기한다.

(6) 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-ROM에 담아 제출 한다(각 파일은 캐드 파일과 일반 범용 그래픽 파일로 변환된 파일을 함께 구분하여 제출한다)

5) 유지관리지침서 등 작성

(1) 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성하여야 한다.

(2) 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

(3) 국토교통부 도서납품 기준에 맞게 설계도서를 작성한다.

(4) 유지관리지침서 작성해야할 사항은 1) 개요. 2) 구조계획도. 3) 구조특성. 4) 유지관리시설. 5) 보수방법. 6) 유지관리장비, 안전점검시 점검항목 및점검 방법등. 7) 붕괴 유발부재를 별도 명기하고 점검방법설명. 8) 계측시스템 설치가 필요한 경우 계측관리계획을 상세히 작성한다.

6) 공사시방서

(1) 공사 시방서는 표준시방서 (건축, 토목, 조경, 기계, 전기․통신 편)를 기준으로 작성한다.

공사시방서는 표준시방서를 활용하여 작성하되 전문시방서 공종분류 체계에 맞게 작성하고, 자재․입찰절차․ 공사비․공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성한다.

(2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되도록 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

② 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

⑤ 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

⑥ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

⑦ 발주부서와 시공자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종 검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세

사항

⑩ 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요 인원 등에 대한 상세한 규정

⑪ 공사 전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 기타 주요공사 사항

(3) 공사시방서 작성요령

① 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준)는 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 계획/중간설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술

② 공사시방서는 전문시방서 공종분류 체계에 맞게 작성하고, 자재․입찰절차․ 공사비․공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정․보완하여 작성하여야 한다.

(4) 공사시방서 작성 일반사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성함.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

⑧ 발주부서의 의도를 정확히 파악하고, 발주부서의 감독, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

⑩ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

7) 공사내역서

(1) 공사내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 참조 발주부서와 협의하여 적용하여야 하며 내역서 파일은 계룡시 계약심사를 위한 원가심사지원시스템 적용이 가능한 XML파일로 제출하여야 한다.

(계룡시 공사계약심사부서의 승인을 득한 후 내역서를 확정한다)

- XML 내역서 작성시에는 직접공사비만 등록하고 간접노무비, 산재보험료, 일반 관리비 등 원가계산서 항목에 기입될 내용은 원가계산서에 기입한다.

※ 호환규정(XML)

- XML은 시중 상용 프로그램에서 작성한 설계내역을 원가심사 지원시스템에서 그대로 활용 할 수 있도록 만든 호환프로그램입니다.

- EBS, EMS 등 시중 10여종 이상의 상용프로그램에서 동 호환규정을 수용하여 XML 파일로 저장할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다.

(2) 공사비 내역서는 국토교통부 ‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 협의하여 적용하고 “행정안전부 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령” 및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준에 의하여 산출한다.

① 재료비

a. 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.

b. 조달청 조달정보에 미 수록된 자재는 재정경제부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용 하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

c. 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다. 단 그러하지 못할 경우에는 그 타당한 사유를 기재하여야 한다.

② 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업 중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

(3) 공사비(전기․통신, 소방공사 및 부가가치세, 이설비 포함)을 기준으로 하며, 설계금액이 초과할 경우 발주부서(관악구청 복지정책과)와 협의하여야 한다.

(4) 공사비에는 지하시설물 이설비, 필요시 에너지 인입 공사비 및 폐기물처리비 (100톤이상 시 별도 작성) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

(5) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당 코드 번호를 필 히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가 산출 조서에 그 근거를 기록한다.

(6) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

(7) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

(8) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

(9) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

(10) 운반비는 목적지, 운반장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

(11) 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

① 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙

② 지방재정법 및 동법 시행령, 재무회계예규

③ 기타 관련법규 및 기준

8) 예정공정표 작성

예정공정표는 PERT- CPM 기법으로 백도에 A1의 크기로 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축소하여 대표자 날인후 제출 한다.

9) 지하시설물 조서 및 인․허가 도서

(1) 지하시설물 조서 작성

① 지하시설물은 발주부서와 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

② 과업시행으로 인하여 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재한다

(2) 인․허가 도서 작성

관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 요청용 도서를 작성한다.

10) 설계도서 검토

(1) 검토 방법

① 설계시행 책임기술자가 검토

② 먼저 각종계산서 확인 검토

③ 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

④ 공사분야별(건축, 기계설비, 전기설비, 통신설비 등) 도면 일치 여부

검토

(2) 제출도면

검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토도면 1부 제출

(3) 제출시기 : 중간검토(계획/중간설계완료후) 및 준공 시 제출

11) 안전관리문서 제출

- 설계자는 가)에서 다)항의 내용을 포함하는 안전관리문서를 발주처에 제출하여야 한다.

(1) 설계과정 중에 도출한 건설안전 위험요소(Hazard) 및 위험성(Risk)에 대한 평가를 실시한 결과로서 HRA(위험요소/위험성/저감대책) 형태로 작성된 설계안전성검토(DFS)보고서

(2) 설계안전보건대장

(3) 설계에 가정된 각종 시공법과 절차에 관한 사항

(4) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 HRA(위험요소/위험성/저감대책)에 관한 사항

12) 기타사항

(1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

(4)  공모일정 년,월,일 (2025년 월 일) 표기

3. 성과품의 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 성과품의 납품은 계획(중간)설계 납품, 실시 설계도면  납품, 실시설계 최종납품으로 구분한다.

① 중간설계(계획설계) 납품 : 착수일로부터 90일 이내

② 실시설계 최종납품       : 설계용역 준공기한 이내

2) 성과품 종류 및 납품부수

(1) 계획/중간설계 성과품의 종류 및 납품부수

① 계획설계 도면

- 계획설계 자문용(납품 전 검토용)	10부

② 설계설명서	5부

③ 계획/중간설계심의용 도면	10부

※ 계획/중간설계 심의용 도면 등 자료는 심의기관(기술심사담당관) 심의도서 기준 및 경관심의도서 기준에 의한다

※ 각종 계산서(건축구조, 토목구조, 수리, 설비부하, 전기용량계산 등)는 중간설계 성과품 및 건설기술심의 시 제출

납 품 목 록	규 격	수 량	비 고
계획/중간설계보고서(지반조사보고서 포함)	A4	10
계획/중간설계 도면(A3반책)	A4	10
공사시방서	A4	10
유지관리지침서	A4	10
설계예산서	A4	10

④ 계획/중간설계도면(납품)	5부

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준

(국토교통부 고시) 별표2 기준 적용에따른다.

(2) 실시설계 성과품의 종류 및 납품부수

① 설계설명서	5부

② 실시설계심의용 도면(기본설계심의시 조건부여한 경우에 한함)	10부

③ 실시설계도면 (납품) 붙임 참조

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시) 별표2 기준 적용, 상급 도서를 납품받고자 하는 경우 별표4에 따른 상급 대가요율을 적용하여야 하며, 중급 적용 시 납품 도서는 중급에 해당하는 사항으로 적용함.

④ 투시도 또는 조감도(세로50㎝×가로70㎝)	2부

조감도의 경우 중간설계시 납품 도서 목록에 해당하며, 실시설계에             따른 추가 요구시 별도 대가 반영 필요

⑤ 건축협의도서	1식

※ 상기 내용 납품부수 및 성과품 종류는 감독관과 협의후 최종확정한다.

[붙임] 실시설계 성과품 종류 및 납품부수

종 류	규 격	부 수	비 고
설계도면 (A3반책)	A4	10	※공종분야별 구분 등에 대하여는 감독부서와 협의하여 제출한다. (전기․통신 및 기계, 조경, 소방은 각 성과 품별로 별도 작성 제출 한다.) ※전기, 통신의 경우 구조계산서, 설계표준화 편람 및 도서, 조감도는 해당 되지 않는다. ※예산 내역서는 XML파일로도 제출한다. ※공종분야별 규격 및 제출부수는 임의조정 가능하며 사전 감독 및 발주부서와 협의하여 제출해야 한다. ※ 공사예정공정표에는 건설기술심의(공기산정)를 위해 산출근거를 상세히 제시한다.
출력도면 file(dwg 및 PDF file)	USB	5
설계설명서	A4	10
공사시방서	A4	10
구조계산서(내진설계 포함) 및 지하 흙막이 시설물 및 가시설물(비계, 동바리 등)에 대한 설계도서(구조계산서, 구조검토서 등 포함)	A4	10
예산내역서(실내역)	A4(USB)	각5
일위대가표(실) 일위대가표(공)	A4(USB) A4(USB)	각5 각5
단가산출조서	A4	각5
수량산출조서	A4	각5
각종설계계산서(에너지절약계획서 등 포함)	A4	각7
구조안전 및 내진설계 확인서 및 내진설계체크리스트	A4	각5
각종 설계기준 및 자료(인증관련 포함)	A4	각5
조감도 및 투시도(채색)	세로50㎝×가로70㎝	3
자재내역	A4	3
외부 색상도(채색)	A1	1식
공사 예정공정표(CPM/PERT)	A3	3
유지관리지침서(분야별 통합분)	A4	5
토질조사보고서, 수리계산서	A4	5
건설기술심의 등 자료(공사설명서, 설계 도서, 제안설명서 등)	-	소요량
측량성과품	-	5
기타 관계부서 협의용 설계도서	-	소요량

⃞ 분야별 최종성과품 납품 확인자

○ 건축담당 :                 (서명)

○ 토목담당 :                 (서명)

○ 기계담당 :                 (서명)

○ 전기담당 :                 (서명)

○ 소방담당 :                 (서명)

○ 통신당담 :                 (서명)

※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출한다.

○ 납품도서를 종합하여 USB(3조)로 제출하여야 한다.

○ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함) USB(3조)는 계룡시 계약심사를 위한 XML파일로 전환하여 USB로 제출한다.

○ 내역서 작성요령은 조달청에서 “건축공사 계약요청시 설계도서 작성요령”을 준용하여 계룡시와 수시 협의한다.

※ 상기 내용 납품부수 및 성과품종류는 예시사항이며, 최종 부수 및 종류는      감독관과 협의후 최종확정한다

용역업무수행계획서 책임기술자 명단

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ용역회사 :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자 (설계사,감리사)					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격증번호

설계용역자문 참여기술자 명단

(회사대표, 책임․분야별․참여기술자 등)

구 분	분 야 별		성 명	서 명
설계사	회사명	ㅇㅇ건축사사무소 대표이사 ㅇㅇㅇ ㅇㅇ엔지니어링 대표이사 ㅇㅇㅇ
	참여기술자	사업책임기술자 분야별책임기술자

※ 설계용역  자문회의 각 자료 첫장에 표기

설계용역 종합보고서 책임기술자 명단

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

기술 분야	설계참여기술자 (설계사, 감리사)						서명 (실명)
	성 명	직책	주민등록번호	자격종목 및 등록번호	참여기간	참여세부 수행내용

자격종목 : 국가기술자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록번호를 기재

수행내용 : 분야별 책임기술자 중심으로 주요시설물에 대한 수행한 핵심공법을 파악할 수 있도록 기재

주간업무보고(  주차)

□ 용  역  명 :

□ 용 역 개 요

○ 현장위치 :

○ 용역기간 :

□ 주간업무 진행사항 :

구 분	주간 업무수행 세부내용	비 고
금주진행 사항 ( 월 일 ~ 월 일)
내주예정 사항 ( 월 일 ~ 월 일)
기타사항

주     소 :

상     호 :

대  표  자 :                     (인)

계룡시장 귀하

월간 공정보고

�   용 역 명 :

�   용역개요 :

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 :

◦ 계약금액 :

◦ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20. . . ∼ 20. . .)	비 고
첫째주		실시 / 예정공정 (%)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

계룡시장 귀하

▣ 공사개요

공 사 명		공사종별
위 치
공사기간
용 도		구 조
규 모
친환경적용
추진현황

※ 공사종별: 신축, 증축(수평증축, 수직증축), 리모델링, 개ㆍ보수 등으로 기재

※ 추진현황: 설계완료, 공사발주 중, 공사 중, 준공 등으로 기재

▣ 공사비 및 부대공사비

[단위 : 천원]

공 종	건 축 (토목, 조경포함)	기 계	전 기	통 신	기 타	계	낙찰률 (%)
설 계 액 (부대공사비 제외)
공사금액 (부대공사비 제외)
부대공사비
기타의견	1) ※ 당해 건축물이 타 건축물에 비하여 공사비 증가 또는 감된 요인이 있는 경우 그 사유? 2) ※ 당해 건축물에 대해 「공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인」을 적용한 경우 공사비의 적정성 여부 견해?

※ 설 계 액: 도급비가 아닌 설계가(예정가격)를 기재(부가세포함)

※ 공사금액: 낙찰률이 적용된 최초 공사계약금액(도급금액)

▣ 시설내용

공 종		세부공종		마감자재, 시공공법, 시공여부	비 고
건축	건 축	외부공사	외벽
			방수
			창호
			유리
		내부공사	바닥
			벽
			천장
		기초형식
	토 목	흙막이형식
	조 경	옥상녹화
기계	열원설비
	공조설비
	자동화설비
전기 통신	수배전설비
	자동제어
	BAS시스템
	통신설비
특수설비

▣ 친환경 적용

구 분		적용내용			비 고
건축물에너지효율 인증 등급
에너지성능지표(EPI) 점수
녹색건축 인증 등급
건축물에너지 관리시스템(BEMS) 구축
장애물 없는 생활환경(BF) 인증 등급
제로에너지 인증 등급
단열조치		외 벽		W/㎡K
		최상층지붕		W/㎡K
		최하층바닥		W/㎡K
중수도설비, 우수이용설비
신재생에너지	태양열
	태양광, BIPV
	지 열
	풍 력
	연료전지
	기 타	-
기타 친환경 관련 적용사항

※ 에너지효율 인증 등급: 1+++, 1++, 1+, 1~7등급

※ 녹색건축 인증 등급: 최우수(그린1등급), 우수(그린2등급), 우량(그린3등급), 일반(그린4등급)

※ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 등급: 최우수, 우수, 일반

※ 제로에너지건축물 인증 등급: 1~ 5등급

※ 비고란에 예비인증, 본인증 여부 반드시 기재

※ 개·보수, 리모델링인 경우 당해 공사 시설내용 및 내진 보강공사 시행여부 등 기재

건설공사(설계) 중점관리 체크리스트

하자내용		확 인 내 용	확 인
방 수 방 수	지하층	∘ 1층 출입구 침수 대비를 고려한 시설이 갖추었는지 여부
		∘ 지상에서 지하 주차장 출입 Ramp 통로에 배수로(trench) 설치와 배수구 연결 여부
		∘ 장비 반입구 위치 및 구조가 우수유입을 방지할 수 있는지 여부
		∘ 지하층 바닥 매입배관 설치 지양 여부 - 방수층 보호를 위하여 상부 천장배관 검토
		∘ 주차장의 층간 방수를 하였는지 여부. (방수공법는 침투식 액체방수 등 적정공법 설계반영 여부)
		∘ 드라이에는 방수처리 하고 배수구를 설치하였는지 여부
		∘ 지하층 외벽의 인입배관 관통부 방수 여부 - 실링 가스켓(관로구 방수장치) 등 설치
	화장실	∘ 화장실, 욕실 벽면에 최소 1.5m 이상 내벽 방수를 하였는지 여부.
		∘ 화장실, 욕실 스라브 바닥고가 기준보다 최소 5cm 이상 낮추었는지 여부
	발코니	∘ 발코니 바닥의 방수와 배수처리 여부.
		∘ 동절기에 외부 그릴 창을 통한 한기가 유입되어 수전 및 배관에 결빙이 발생되지 않도록 적정하게 설계가 반영되어 있는지 여부
	옥 상	∘ 옥상 냉각탑은 외부 벽체와 이격거리 확보 또는 루버 설치 여부
		∘ 옥상 바닥의 경사 방향은 Drain의 위치 방향으로 적절하게 표기 여부.
		∘ 옥상에 설치되는 각종 설비시설물 하단에 선 방수처리 후 PAD 설치 여부.
		∘ 옥상 노출 방수공법일 경우 적정한 간격으로 탈기반을 설치하였는지 여부 - 옥상방수는 연질형 재료를 시용한 전면 밀착공법식 복합방수공법 권장(하자근절)
		∘ 옥상 Control Joint 상세 설계 여부.
		∘ 옥상 바닥에 각종 설비(안테나, 피뢰침, 배관 등)를 위한 Opening 표기 여부.
		∘ 옥상 조경시 바닥에 방근 처리시설을 하였는지 여부 - 옥상 방수재는 방근용 PVC 시트 등 설계 반영 여부
		∘ 지붕 면적 및 우수량 산정에 따른 트렌치 단면적 및 선홈통 규격이 적정하게 되어 있는지 여부
	기 타	∘ 공개공지 등 외부공간의 바닥 기층 및 포장다짐의 적정성, 집수정 개소 및 배수 구배 등이 적정하게 반영되었는 지 여부를 확인
		∘ 조경 수목은 인공지반 식재시 적정한 토심과 토양반영여부 확인 - 식재시 배수를 위한 배수시설 및 배수체계의 적정성 확인
		∘ 전기실 침수를 대비한 기계실과 레벨 확인 - 전기실 레벨을 기계실 보다 50C m 이상 높게 시공
		∘ 외벽에 면한 창호에 대하여 창호틀에 몰탈을 충진토록 상세 설계에 반영여부
		∘ 외벽 커텐월과 바닥 스라브에서 하부에 물이 흐르지 않도록 바닥 턱 상세도 표기 여부
결 로 (방 습)	지하층	∘ 지하층 외벽 및 최하층 바닥 결로 방지를 위해 방습벽 및 배수판, 단열설계가 적정하게 반영되어 있는지 여부
		∘ 토사에 접하는 코아벽체에 대한 단열(방수)설계가 적정하게 되어 있는지 여부 - 계단실이 토사와 직접 맞닿은 부분은 내방수 후 계단실을 벽체로 설계에 반영 하였는지 여부 등.
		∘ 지하실의 외부에 면하지 않은 거실 등에 대하여 출입문 등에 환기시설 설치 여부
	벽 체	∘ 외벽 결로 방지를 위해 단열재 시공 상세도면 및 시공방법에 대한 명시 여부
		∘ 외벽 측의 결로를 방지하기 위해 단열몰탈 등의 설계반영 여부
		∘ 결로방지를 위해 측벽 또는 외벽에 각종 박스(스위치,콘센트, 분전반, 단자함 등) 설치 지양 여부 - 직접외기에 면한 분전함 및 통신 단자함 등에 단열설계가 반영 되어 있는지 여부
	식당/주방	∘ 주방 등의 공간 상부 반자시설을 경사 반자로 하여 결로를 한곳으로 흐르게 하였는지 여부.
		∘ 식당(주방) 등의 습도가 높은 곳에는 천장재를 내습자재로 하였는지 여부
		∘ 주방 그리스트랩은 SST박스 대신 골조 또는 누수방지 이중박스 설계 여부
		∘ 다용도실 보조주방 가구 뒤 단열재 설계 적정여부 확인
	환기 시설	∘ 매층과 각실 별 구획부분 반자시설에 환기구 설치 및 지하 계단실의 환기설계 여부
	보온 시설	∘ 옥상 배수 드레인에서 배수 선홈통으로 연결 부위가 옥내 천장으로 관통시 보온 조치를 하였는지 여부.
	옥 상	∘ 최상층(지붕) 스라브에 매입배관 및 매입박스 설치 지양 여부 - 단열재 훼손에 의한 결로방지를 위해 매립배관을 지양하고, 노출배관 시공

【붙임 1】

보 안 각 서

용  역  명 :

계 약 일 자 :

완료예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

다        음

1. 본인은 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행 과정에서 알게 된 정보 또는 기밀 사항을 「용역계약일반조건」 제9절 부정당업자의 제재와 당사자의 의무 2. 기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무에 따라 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 취득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 따라 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 관련 서류 및 자료에 대한 저작권은 저작권 법령에 따르며, 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

년    월    일

주        소 :

주민등록번호(앞자리만) :

담 당 분 야 :

성        명 :                      (인)

계룡시장 귀하

【붙임 2】

책 임 기 술 자 선 임 계

소 속 :
성 명 :
주 소 :
주민등록번호(앞자리만) :
기술면허종별 :
면 허 번 호 :

상기인을 「엄사면 공영주차타워 건립공사 건축설계용역」의 (건축,기계,소방,전기,통신,토목,구조 등) 책임기술자로 선임하여 제출하오니 승인하여 주시기 바라오며 (건축, 기계, 소방, 전기, 통신, 토목, 구조 등) 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자는 책임을 질 것을 서약합니다.

붙임 :	1. 경력증명서 원본	1부.
	2. 재직증명서	1부.
	3. 자격증 사본	1부. 끝.

	< 계 약 자 >
	업체명:
	주 소:
	날 짜:	년 월 일
	대표자:	(인)

계룡시장 귀하

【붙임 3】

(기본, 실시) 설 계 검 사 원

용  역  명 :

용역착수일 :

용역준공일 :

계약  금액 :

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

위와 같이 (기본, 실시)설계용역이 완료되어 설계검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

	< 계 약 자 >
	업체명:
	주 소:
	날 짜:	년 월 일
	대표자:	(인)

계룡시장 귀하

【붙임 4】

월 간 공 정 보 고

설계  용역명 :

설계용역기간 :

보 고  일 자 :

보   고   자 :                                (인)(건축책임기술자)

공정보고내용 : 1. 전체 공정의 진행상황(예정/실시)

2. 전월 작업내용/금월 예정 작업내용

3. 인원투입현황 및 외주작업현황(단위는 시간으로 표기)

4. 공정진행상의 문제점 및 해결책

	< 계 약 자 >
	업체명:
	주 소:
	날 짜:	년 월 일
	대표자:	(인)

계룡시장 귀하