동부예산권 응봉면 기초생활거점조성사업

한마음체육센터 과업내용서

2025. 06.

-  목    차  -

제1장 총칙

1. 과업의 명칭	01

2. 과업의 목적	01

3. 과업의 내용	01

제2장 과업일반사항

1. 과업수행 기본방향	05

2. 용역수행자의 책임과 의무	06

3. 과업의 수행절차	09

4. 기타	12

제3장 일반지침

1. 적용기준	15

2. 중간설계	16

3. 실시설계	17

제4장 기술지침

1.  분야별 설계지침	18

제5장 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항	29

2. 성과품의 작성	30

3. 용역비 산정과 지불	33

제6장 납품목록

1. 계획설계 납품목록	36

2. 중간설계 납품목록	36

2. 실시설계 납품도서	37

제1장 총  칙

1.1. 과업의 명칭

「응봉면 기초생활거점조성사업 한마음체육센터」 건립공사 설계용역

1.2 과업의 목적

- 한마음체육센터는 농림축산식품부에서 시행하는 일반농산어촌개발사업의 응봉면 기초생활거점조성사업을 통해 추진하는 사업임.

- 본 사업은 충청남도에서 시행하는 「목재 이용 공공건축 지원 시범사업」으로, 공공건축물에 자연친화적 재료인 목재를 현대적 시각에서 창의적으로 이용함으로써 건축물 이용자들에게는 쾌적한 공간환경을 제공하고 건축 전과정에 있어 탄소 절감을 실천하는데 목적이 있음.

- 응봉면은 공공 체육시설 부재로 시설 이용을 위해 주민들이 타 읍·면으로 이동하는 불편함을 겪고 있으며, 체육시설 외 문화·복지 서비스 등 인프라 시설이 부족한 실정으로 주민이 다양한 체육·문화 서비스 혜택을 받을 수 있도록 시설을 조성하여 신규동아리 조직 및 다양한 프로그램과 활동으로 건강서비스·소통의 장을 마련하고자 함

1.3. 과업의 내용

1.3.1. 과업의 개요

1) 한마음체육센터 조성사업 건축개요

구 분	내 용
위 치	충청남도 예산군 응봉면 노화리 55-42, 55-43
지역지구	계획관리지역, 가축사육제한구역
대지면적	4,242㎡
규 모	지상 1층
주 용 도	운동시설(다목적강당)
건축면적	595.7 ㎡(±5% 내외)
연 면 적	595.7 ㎡(±5% 내외)
용 적 률	14.04 %
건 폐 율	14.04 %
주차대수	8대 (장애인1대 포함)
주요시설	다목적강당, 사무실

2) 추정 공사비 : 2,739,500,000원 (부가가치세 포함)

- 제시된 예산액은 건축, 토목, 기존건축물 철거공사, 인테리어, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경, 폐기물 처리에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함하여야 함(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

- 공사비 증가가 예상되는 과도한 굴착공사는 지양하며, 제시된 연면적에서 제외되는 면적(옥탑등 건축법 상 바닥면적 산정 시 제외되는 면적), 필로티공간 면적도 예정공사비 사업예산 범위 내에 포함하여 설계가 이루어지도록 하여 공사비가 초과되지 않도록 특히 유의하기 바람.

- 용역수행자는 ‘추정 공사비’를 넘지 않는 범위에서 설계하여야 한다.

- 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응하여야 한다.

3) 설계용역비 : 192,600,000원 (부가가치세 포함)

※ 설계용역비 안에는 인허가 인증 절차에 대한 추가 요율이 반영되어있음

※ 설계용역비 안에는 인허가 인증에 대한 심사수수료가 포함되어있지 아니함

※ 설계용역비에는 지질조사비용이 포함됨.

4) 과업 수행기간: 착수일로부터 180일 (공휴일 포함)

※ 과업기간의 연장: 다음과 같은 부득이한 경우에는 과업 수행기간을 변경할 수 있다.

「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」(행정안전부예규 제282호, 2024.03.28.)

- 제9장 제6절. 공사 설계변경, 용역 과업내용 변경 및 물품수량조절 등

- 제9장 제8절. 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지

1.3.2. 과업의 범위

가. 본 과업은 광시 어울림센터 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인허가에 필요한 서류 작성, 제출, 제반협의, 각종 인증 등 모든 행정절차를 포함한다.

1) 사전조사 업무

용역수행자는 공모당선 이후 용역착수 전 현장을 답사하고 해당 인·허가 관청을 방문·협의하여 관련 법규, 해당 지자체 조례 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 인·허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

2) 설계 업무

계획설계[당선작의 사용자 협의단계], 중간설계, 실시설계 단계의 과업과 더불어 발주기관에서 계획하는 추진일정에 맞추어 각종 심의, 인․허가 등을 위한 설계내용의 설명, 자료보완[조감도 등], 보고, 관계기관 협의, 회의 참석, 각종 자료 작성 등에 관한 업무를 수행하여야 한다.

3) 일체 인·허가 업무

- 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대관 인·허가는 용역수행자가 대행하여야 하며, 대관 인·허가, 각종 심의, 인증 취득 등에 필요한 서류 작성 등의  업무를 수행하여 인·허가를 득하여야 한다.

- 용역수행자는 본 용역이 완료 전 □ 후라도 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

4) 각종 관계법령 규정에 의한 인증 업무

- 제로에너지건축물인증 4등급 이상

- 장애물없는생활환경(BF)인증 우수등급 이상

나. 공종별 모든 과업물의 세부협의는 발주기관인 예산군과 하며, 최종안을 확정하여 전 과정은 회의록을 작성하여 제출한다.

다. 설계도서 납품 후 일상감사 및 계약심사 등에 지적된 사항에 대하여 납품 완료 후에라도 보완하여 성과품을 제출한다.

라. 설계의도구현비, 지질조사 등은 설계용역비에 반영되어있지 않으므로 추후 발주처와 별도 발주 및 실비정산처리 등을 협의한다.

마. 공공건축물 사전검토, 공공건축심의, 설계 공모 심사의견을 반영하도록 하여야 한다.

바. 당선작은 발주처 및 주민협의체 회의를 거쳐 설계 수정을 진행해야 되며 설계에 반영해야 한다.

사. 시설공사 시 건축서비스산업진흥법 제22조, 같은 법 시행령 제19조, 공공건축 설계의도 구현 업무수행지침(국토교통부)에 따라 설계의도 구현을 위한 설계도서의 해석 및 자문, 현장여건 변화 및 업체선정에 따른 자재와 장비의 치수·위치·재질·질감·색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토·보완 업무를 하여야 한다.

아. 전문가 활용

1) 계약상대자는 ‘공공부문 건축디자인업무기준의 공공건축가 활용 의무화□에 따라 건축물과 공간환경의 디자인 관리에 대해 자문을 받아야 하며 발주기관이 위촉한 공공건축가가 기본계획에 참여할 수 있도록 한다.

2) 설계용역 진행과 관련하여 충청남도 「목재이용공공건축 지원 시범사업」에 의한 목재이용 공공건축 추진단 의견을 적극 반영한다.

3) 전문가(공공건축가 포함)를 통해 자문을 받는 경우 설계내용에 반영하고 자문회의록은 전문가의 서명을 날인하여 중간 및 실시 설계보고서 부록에 첨부한다.

자. 설계의도의 구현

1) 관계법령

- 용역 수행자는「건축서비스산업진흥법」제22조(설계의도 구현)에 따라 건축물의 설계의도가 구현될 수 있도록「의좋은문화뜨락」의 건축과정에 참여하여 같은법 시행령 제19조(건축과정에의 용역수행자 참여 기준 등)의 업무에 협조하여야 한다.

2) 과업의 내용

- 설계도서의 해석 및 자문

- 현장여건 변화 및 업체선정에 따른 자재와 장비의 치수ㆍ위치ㆍ재질ㆍ질감ㆍ색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토ㆍ보완

제2장 과업 일반사항

2.1. 과업수행의 기본방향

2.1.1. 용어의 정의

가. 발주기관

‘발주기관’이라 함은 해당용역의 시행주체인 ‘예산군’을 의미한다.

나. 용역 수행자

‘용역 수행자’라 함은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제14장제1절제3호의 ‘계약상대자’를 의미한다.

다. 감독관

‘감독관’이라 함은 용역 수행자가 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘 및 감독할 수 있는 자로서 예산군이 임명·통보한 직원을 말한다.

2.1.2. 일반사항

가. 용역 수행자는 본 과업내용서의 문구 해석상 계약 상대자간 차이가 있을 경우 및 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 용역 수행자 임의로 판단해서는 안되며, 발주기관과 협의를 통해 이행한다.

나. 본 과업내용서에 규정되지 않은 사항은 발주기관의 관련규정 및 정부관련 법령 및 정부제정 각종 시방서·규정 등에 따라 발주기관과 협의하여 수행하여야 하며, 단 분야별 내용이 상충될 경우에는 그 규정이 강화된 것을 우선한다.

다. 그 외 명시되지 않은 계약에 관한 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 등에 따른다.

라. 본 용역의 준공 이후 저작권은 저작권법 및 관련 행정규칙 등에 준수하여 따른다.

2.1.3. 감독관(발주기관)

가. 감독관은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 용역 수행자에 대하여 다음의 계약 관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 용역 수행자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원현황

2) 각종도서 작성현황 및 공종별 업무수행상태

3) 기타 확인이 필요한 사항

나. 용역점검

감독관은 용역품질 확보를 위해 용역 수행자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 용역 수행자는 감독관과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

2.2. 용역수행자의 책임 및 의무

2.2.1. 용역 수행자의 책임 및 손해배상

가. 설계의 책임 및 손해배상은 관계법령에 의한다.

나. 본 과업을 수행함에 있어 일어나는 모든 사고는 용역 수행자가 책임을 진다.

다. 용역 수행자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적 모순, 관계법령 위반 등)로 인하여 발생되는 인명피해, 재산상의 손실, 기타 공사 진행상 초래되는 문제점 등 모든 사항에 대하여「건축사법」제20조(업무상의 성실 의무 등)에 의한 설계변경, 손해배상 등을 포함한 일체의 책임을 져야하며,「같은 법 시행령」제21조(건축사의 보험 또는 공제 가입)에 따라 손해배상 보험증서 또는 공제증서를 제출한다.

라. 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 설계도서의 성과로 첨부된 경우도 위와 같다.

마. 용역완료 후에도 공사 중 발생하는 설계도서에 관한 문의 및 질의사항에 대해 적극적으로 협조(답변서 제출 등)한다.

바. 용역완료 후에도 위 사항에 대한 발주기관의 수정·보완요구가 있을 때에는 용역 수행자의 부담으로 이행한다.

사. 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중이라 할지라도 용역 수행자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

2.2.2. 문서기록 및 설계보완

가. 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성  및 비치하고 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

나. 용역 수행자는 완성된 설계도서에 대하여 관련법규에 따른 협의, 심사, 감사 등의 행정절차 이행시 지적된 사항에 대하여 적극 협조하여 수정 및 보완하여야 한다.

2.2.3. 보안 및 비밀유지

가. 용역 수행자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 보안사항 불이행으로 인한 모든 책임을 져야 한다.

나. 용역 수행자는 보안대책을 수립하여야 하며 착수계와 함께 용역 수행자 보안각서와 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역참여자가 교체될 시에도 동일하다.

다. 용역 수행자는 본 과업을 수행함으로써 발생되는 자료 및 내용 등을 발주기관의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안된다.

2.2.4. 용역수행자의 교체

가. 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력·경험 및 자격을 갖추어야하며, 발주기관이 과업수행에 부적격하다고 판단되는 경우 교체를 요구할 수 있으며 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나. 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 또는 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생했을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자 또는 그 이상으로서 발주기관의 승인을 받은 후 교체해야 하며, 교체에 소요되는 기간으로 인하여 과업수행에 지장을 주어서는 안된다.

2.2.5. 용역 중지

가. 용역수행자의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청 기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단 될 경우 감독관은 용역 중지를 명할 수 있다.

나. 과업 수행 중 정책변경, 기술심의, 경관심의 등 불가피한 사유발생시 발주기관은 본 용역을 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며, 과업이행요청서의 문구 해석상 계약 상대자간 차이가 있을 경우 발주기관의 해석을 우선적으로 하고 기타, 명시되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관이 정하는 바에 따른다.

다. 수요조사, 주민의식조사, 사업타당성검토 등을 통하여 더 이상 과업을 진행할 수 없는 것으로 판단되는 경우, 이때까지의 공정율을 근거로 타절 준공 한다.

2.2.6. 과업내용 변경

가. 발주기관은 다음과 같은 경우에 과업내용 변경을 요구할 수 있으며 용역 수행자는 이에 따라야 한다.

1) 상위계획 또는 발주기관의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

2) 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

3) 용역 수행자의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

나. 발주기관의 요구에 의하여 과업 범위의 증감이 발생할 경우 예산의 범위 내에서 당해 계약금액을 조정 또는 정산한다. 과업범위의 현저한 변경이 없이 중간설계 또는 실시설계 결과 과업제시기준 공사비를 초과한 범위에 대하여는 용역비의 증액 지급이 불가하다.

2.2.7. 주요 업무의 사전승인 등

가. 용역 수행자는 다음 사항에 대하여는 발주기관의 승인을 득한 후 과업을 수행하여야 한다.

1) 착수보고서 내용의 변경

2) 주요설계 내용의 변경

3) 자문 및 관계기관과의 협의사항

4) 기타 감독관이 요구하는 사항

나. 용역 수행자는 예정일정표에 의하여 실시설계를 추진하되 과업진행 전반에 걸친 사항을 본 발주기관과 수시로 협의하고 협의된 내용을 설계에 성실히 반영하여야한다.

2.2.8. 하도급의 범위

가. 용역 수행자는 본 과업을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나. 하도급 처리 가능 사항

1) 건축 구조 및 가설 구조[흙막이 가시설, 비계, 동바리 등], 토목 구조, 조경, 기계설비, 통신 등 전문 분야 업무

2) 각종 공사 내역서 작성[수량산출, 단가산정 등]을 위한 업무

3) 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

다. 하도급에 의한 성과품에 관한 책임사항은 용역 수행자에 있다.

라. 용역 수행자가 본 용역의 일부를 하도급 할 경우 사전에 하도급자에 관한 사항 및 계약 내용을 발주기관으로부터 승인을 득 하여야 한다.

2.3. 과업의 수행절차

2.3.1. 착수신고서 제출

가. 과업수행자는 계약 체결 후 7일 이내에 과업에 착수하여야 하며, 착수와 동시에 다음 사항이 포함된 용역수행계획서를 제출하여야 한다.

1) 과업 수행내용·방향 및 방법

2) 각 분야별 과업 참여자의 명단 및 이력사항

3) 과업참여자의 보안유지 서약서

4) 사업추진계획(일정)표, 기타 필요한 사항 등

5) 과업 착수계

나. 용역 수행자는 용역계약일반조건 제13조에 따라 계약상대자는 과업 착수시 관련 법령에서 정한 서류와 다음 각호의 사항이 포함된 착수신고서를 계약일로부터 7일이내에 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 사업자등록증, 건축사 면허증, 건축사업무신고필증 사본

2) 사용인감계 및 인감증명서, 법인등기부 등본

3) 공종별 책임기술자 선임계(재직, 경력증명서, 기술자면허수첩 사본)

4) 분야별 참여기술자 투입 계획

5) 설계용역 수행 조직표(연락처 기재)

6) 설계용역 예정 공정표(분야별 세부공정계획서 및 업무 흐름도)

7) 설계용역비 산출내역서(각 분야별로 작성)

8) 분야별 참여기술자 보안각서

9) 하도급현황(공동도급 수급체 구성원은 하도급 대상 아님)

10) 설계용역 계약서 사본(분담이행 협약서 등)

11) 기타 발주기관이 필요하다고 판단되는 사항

2.3.2. 기타 제출서류

가. 수급인은 필요시 다음 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

1) 용역 기성부분 검사원

2) 준공기한 연기원

3) 준공검사원

4) 기타 용역수행에 필요한 사항

2.3.3. 계약관련 일반 사항

가. 계약 당사자 상호 협의에 의하여 다음의 경우에는 계약내용을 변경할 수 있다. 다만, 당초 방침 변경을 수반하지 않는 계약 변경으로 인한 추가 비용은 과업 수행자가 부담

1) 과업내용이 당초계획과 현저하게 달라진 경우로 감독관이 판단하여 계약변경이 필요하다고 인정되는 경우

2) 계약체결 후 중대한 착오가 발견되었거나 기타 계약금액을 조정할 사유가 발생하였을 경우

3) 계약변경으로 인하여 과업시행 범위 및 기간이 변경된 경우

4) 기타 부득이한 사유로 인하여 계약의 변경이 필요하다고 인정되는 경우

나. 과업수행자의 과실 등으로 과업수행이 불가하다고 인정될 경우 계약을 해약 가능

1) 과업을 수행함에 있어 계약내용이나 과업지시서를 현저하게 위반한 경우

2) 성실하게 과업을 수행하지 않아 과업목적을 달성하기가 어렵다고 판단될 경우

3) 기타 부득이한 이유로 과업을 계속할 수 없는 경우

4) 해약으로 인한 손해가 발생할 경우 원인제공자가 보상하는 것을 원칙으로 하며 세부적인 사항은 관련법에 따름

다. 과업수행자는 천재지변 등 부득이한 사유로 과업기간 연장이 필요한 경우 계약기간 연장을 요청 가능

2.3.4. 보고회

책임기술자는 착수보고서 및 과업수행계획서 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 보고해야 한다.

가. 착수보고회

1) 용역 수행자는 현장여건 등을 검토한 후 용역착수 후 14일 이내에 착수보고를 하여야 한다.

2) 착수보고는 사업 책임기술자가 직접 보고하되, 설계계획서 내용을 중심으로 세부 과업수행계획을 보고하여야 한다.

나. 중간보고(회)

중간보고는 기본(중간)설계가 완료된 후 기본 설계안을 바탕으로 해당 부서 및 관계자와의 협의를 통해 요구사항을 최대한 반영할 수 있도록 하며, 각종 행정절차의 진행계획을 설명한다.

다. 용역준공 전 최종보고회

용역 수행자는 용역준공 15일전까지 용역수행 결과를 종합하여 용역 준공 전 최종보고하며, 사업 책임기술자가 직접 보고하여야 한다.

※ 일정은 추후 발주기관과의 협의 하에 변경 가능

2.3.5. 업무 보고

가. 주간보고

용역 수행자는 과업수행기간 중 아래 내용에 대하여 주간 진도보고를 매주 수요일을 기준으로 서면보고 하여야 한다.

- 과업추진내용 및 공정현황

- 각종 문서수발 현황

- 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

- 참여기술자 현황

- 다음 주 과업수행계획

나. 수시보고

1) 용역 수행자는 감독자의 요구가 있거나 과업수행 중 해결하여야 할 중요한 문제가 발생(주요계획 및 방침의 결정과 변경)시 또는 조사 및 자료수집 완료와 공법결정시 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 한다.

2) 감독자의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

다. 주민설명회

감독관의 요청 시 주민설명회를 개최하여야 한다.(지역주민 등에게 건축설계 내용 설명)

2.3.6. 업무 협의

용역 수행자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

가. 수시 회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 하며 보고회의는 상호간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

나. 기타 회의

1) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 용역 수행자는 발주기관과 협의하여 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

2) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

2.3.7. 업무보고 및 회의내용의 기록

각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

2.3.8. 완료계 제출

용역 수행자는 업무완료보고 후 설계용역 완료보고서, 손해보험 또는 공제가입 증서, 최종성과품을 첨부하여 완료계를 제출하여 승인을 받아야 한다.

2.4. 기타

2.4.1. 설계자문 및 각종심의

가. 용역 수행자는 본 과업수행 기간 중 발주기관이 실시코자 하는 설계사항에 대하여 공공건축가 등 자문에 필요한 자료 준비 및 협조를 하여야 한다.

나. 공공건축가의 자문사항에 대해서는 검토 후 설계에 반영 여부를 발주기관에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

다. 설계용역 착수·중간·최종 보고회 시 목재이용 공공건축 추진단의 자문을 시행하고 계획 및 결과를 도에 통보하고 승인을 득한다.

라. 각종 심의 지적사항에 대하여는 검토 후 반영여부를 발주기관에 제출하여 승인을 받도록 한다.

마. 본 과업수행 기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요한 경우 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 용역 수행자가 준비하여야 한다.

바. 용역 수행자는 본 과업과 관련된 해당 심의(자문)위원회 개최 등 발주기관의 요구가 있을 시 참석하여 설명하고, 각 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변토록 하여야 한다.

2.4.2. 관련기관 인․허가 및 협조

가. 용역 수행자는 계약후 7일 이내에 건축물(허가, 신고, 산지전용 등) 인.허가에 문제가 없는지를 조사, 법적검토를 하고 그 결과를 감독에게 보고 하여야 한다.

나. 용역 수행자는 설계도서 납품 전에 관련법규에 의한 건축협의 등 각종 인․허가를 완료하고 협의결과에 대한 사항을 반영한 후 납품하여야 하며, 건축 인허가 및 제반 인허가에 소요되는 비용은 용역 수행자 부담으로 시행하여야 한다(면허세 등 소유주 및 지자체가 부담해야 하는 비용은 발주기관에 보고하여 사업추진이 원활하게 한다)

다. 본 용역 기간 중에 시행하는 각종 평가, 심의, 설계의 경제성 등 관련법 이행이나 행정절차가 필요한 경우 감독원의 요구에 따라 이행하거나 자료를 제출하여야 하며 비용은 용역 수행자가 부담한다.

2.4.3. 조사 및 자료수집

가. 현지조사

1) 현장조사

용역 수행자는 현지의 상태, 주변 건축물, 교통, 수목, 시각분석, 기후분석 등을 조사하고 2면 이상에서 사진 촬영한다.

사용자와의 면담, 행태조사, 회의 등을 통해 사용자에 대해 조사하고, 기존 시설물의 설계도서, 설비용량을 분석한다.

2) 도시기반시설 자료수집.

전기(소방), 통신, 상하수도, 오폐수처리방법, 가스, 교통(도로 등), 지역냉ㆍ난방 등의 시설과 인입비용 등 공사에 필요한 사항 일체를 조사한다.

※ 설계자의 자료요청이 있을 경우 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 제3조에 의거한 자료는 발주자가 제공한다.

3) 인접지역 조사

주변 건축물현황, 인접 공사장, 민원 예상현황, 토취장, 사토장, 각종 장비와 자재(폐기물, 흙 등) 운반로 등을 조사한다.

4) 필요시 폐기물 등을 조사한다.

나. 각종 서류조사

가) 토지대장, 지적도, 등기부등본, 도시계획확인원, 지방자치단체조례 등을 조사한다.

나) 기존 건물의 증축 시는 기존 건물 및 부속시설에 대하여 조사한다.

다) 유사건축물의 공사비, 평면, 입면 등 계획에 필요한 사항을 조사한다.

다. 통계자료의 사용

통계자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용하여야 하며, 다음 각 호의 순서로 활용하고 자료의 출처를 명확히 하여야 하며 자료가 원문일 경우에는 번역 공증기관의 번역서를 첨부하여야 한다.

1) 기획재정부 통계자료

2) 국토교통부 등 정부기관 통계자료

3) 과업대상 사업지구 관할 지자체 통계자료

4) 기타 공공기관 통계자료 및 현지 조사결과

제3장 일반지침

3.1. 적용기준

가. 용역 수행자는 설계내용이 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법, 해당 지자체의 조례, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 측량·수로조사 및 지적에 관한 법, 환경영향평가법, 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 녹색건축조성지원법 등 기타 관련법규 및 제반 규칙 등 관계법령에 위배․저촉되지 않고, 각 공종간의 긴밀한 협조체제를 구축하여 세부 설계내용에 상호 모순됨이 없도록 한다.

나. 과업수행자는 본 과업설명서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

다. 용역의 수행은 본 과업설명서에 의하되 세부적인 사항은 과업수행자와 발주기관이 협의하여 보다 합리적인 방안으로 구체화시킨다.

라. 건축물의 미적요소를 갖추어 안정성, 경제성, 시공의 난이성 및 기능의  합리성이 검토 되어야 하고 조형미의 구현에 합당하도록 설계하여야 하며 지나친 외관치장을 가급적 피한다

마. 본 사업 집행이 예산 범위 내에서 집행될 수 있도록 적정하게 설계하여야 한다.

바. 각 분야별(건축, 토목, 조경, 전기, 소방, 통신, 설비 등) 용역 수행자는 상호 긴밀히 협의하여 시공, 기능, 유지관리 등 문제가 없도록 설계에 철저를 기한다.

사. 과업수행자는 대지의 현황에 대한 실사를 실시하여 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(인접 대지에 손실을 초래할 사항, 향후 발생 장애요인 및 민원야기 사항 등)을 조사하여 발주청과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

아. 에너지 절약형 건축물이 되도록 다음과 같은 사항은 설계에 반영한다.

1) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지절약형 구조로 설계하고 고효율 자재 및 시스템을 적용

2) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기 시설로 실내환경을 최적화 하고 각 실별 용도에 따른 적정 조도의 반영

3) 열원 공급실은 배관의 에너지손실을 고려하여 배치하여 열손실 방지 및 유지관리가 편리하도록 한다.

자. 대상 사업지의 기초생활거점조성사업 기본 계획서를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

차. 안전사고 사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계 시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

- 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책

- 구조물 시공 시 안전대책

- 우기 및 동절기 안전대책

- 유지관리 종합 안전대책 등

카. 주변 시설 운영에 지장이 없도록 소음, 분진 최소화, 공사차량 진출입 등 공사관리계획을 수립하여야 한다.

타. 대상 사업지의 목재이용 지원 시범사업을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

3.2. 중간설계

3.2.1. 정의

“중간설계”라 함은 발주기관에서 제공한 자료와 조사 및 자료수집내용을 근거로 건축물의 규모, 예산액, 기능성, 구조적 안전성, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 설계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관 분야(구조, 기계설비, 통신, 토목 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토되고 발주기관의 요구조건을 반영한 계획(안)을 발주기관에 제안하여 승인받는 설계이다.

3.2.2. 중간설계서 작성

가. 용역 수행자는 조사 및 자료수집에서 얻은 정보와 설계공모 때 제시한 계획(안)을 기반으로 합리적인 설계가 되도록 한다.

나. 중간설계 제출도서는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 [별표2]에 의거하여 작성한다.

3.2.3. 중간설계서 제출방법

중간설계가 완료되면 용역 수행자는 중간설계 검사원을 작성하여 제출하여야 하며, 중간설계 단계에서 결정되지 못한 사항에 대하여 용역수행자는 7일 이내에 보완된 중간설계안을 준비하여 발주기관에 제출․승인 받아야 한다.

3.3. 실시설계

3.3.1. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 공사의 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로 공사의 범위, 기능, 구조, 미적 구성요소와 수요기관의 요구조건을 충분히 반영하여 실현할 수 있는 설계도서를 말한다.

3.3.2. 실시설계서 작성

실시설계 제출도서는「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 [별표2]에 의거하여 작성한다.

3.3.3. 실시설계서 제출방법

실시설계가 완료되면 용역 수행자는 실시설계 검사원 및 공종별 설계도서 제출 목록을 작성하여 발주기관에 제출한다.

제4장 기술지침

4.1. 분야별 설계지침

4.1.1. 건축 분야

가. 일반 사항

1) 공모안을 최대한 준수하되, 대상 사업지의 기초생활거점조성사업 기본 계획서 및 발주처 요구사항에 대하여 충분히 검토하여야 한다.

2) 현장을 면밀히 검토하여 용도에 적합한 효율적인 배치 및 조성계획이 되어야 한다.

3) 기능 및 건축구조가 적정하며 부등침하 우려가 없고 안전해야 한다.

4) 건물 및 각종 시설물의 내구성·안정성(불연성, 내연성)·기능성·시공성·경제성 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

5) 건축계획 전반에 걸쳐 장애인 및 어린이를 포함한 노약자 등의 접근이 용이하고 안전하게 계획하고 장애물없는생활환경(BF)인증 기준에 준하는 설계를 반영한다.

6) 사용하는 재료 및 재료의 치수 등은 발전적인 방법과 시공성을 고려한 최적화 방법을 채택하여 설계한다.

7) 현지여건 건축환경(시공성, 자재수급, 공사비, 공사기간 등)을 파악하여 가장 합리적인 계획을 설계에 반영한다.

※ 수급이 원활하지 아니한 자재를 채택하여 정상적인 공정을 방해하거나 공정의 지연이 발생할 수 있는 건축재료 또는 기타 요소의 설계를 피하여야 한다

8) 용도와 기능에 적합한 설계를 통한 공간계획과 각 실별 기능이 연계된 평면계획이 이루어질 수 있도록 한다.

9) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 방수 및 누수에 관한 공법 및 사용자재 선정은 발주기관의 승인하에 진행토록 한다.

10) 초기투자비와 운영비가 저렴한 에너지 절약형 설계를 구현한다.

11) 외부의 이질마감재료 간의 Joint 부분이 밀실하게 시공되도록 도면을 구체적으로 표기하고, 누수문제가 발생하지 않도록 충분한 검토를 한다.

12) 가시설물에 대한 검토를 충분히 하여 시공시 문제점이 발생하지 않도록 한다.

13) 건축물의 구조부 또는 내외부마감재는 목재를 이용한 친자연적 공간으로 디자인하여 친환경적 이미지로 차별화될 수 있도록 계획한다.

- 목구조 이용시 건축의 국내외 동향 등을 면밀히 파악하여 반영하며, 구조적 측면과 기능적, 경관적인 측면 등을 복합적으로 고려하여 설계한다.

- 「건축물의 구조기준 등에 관한규칙 제9조의3」이 정하는 목구조 건축물의 규모 제한에 관한 사항의 법령 재·개정 동향을 주시하여 설계한다.

- 「건축물의 피난·방화 구조 등의 기준에 관한 규칙 별표 1」에서 정하는 내화 성능 기준에 적합한 목재제품(목구조) 생산 상황 등 국내·외 목재 시장 동향을 면밀히 파악하여 설계한다.

나. 배치계획

1) 부지 내 ․ 외부 도로와 기존 시설물, 대지 고․저차, 건축물의 규모, 주변환경, 보행자와 차량의 동선 요구 조건 등을 충분히 고려하여 적정한 배치계획이 되도록 설계에 반영한다.

2) 사업부지는 북측의 과수원으로의 일조영향, 대지의 안전, 피난방화를 고려하여 충분한 이격거리를 고려하며, 인접대지가 사유지임을 고려하여 부지 경계의 차폐, 차단계획을 수립다.

3) 사업부지는 동서방향으로 장방형 형태로 대지진입로인 동측과 서측의 현황레벨을 충분히 고려하여 절성토가 최소화될 수 있도록 건축물을 배치한다.

4) 인접대지와 레벨차를 고려한 배수계획 및 대지경계의 구조물 계획을 수립하되 구조물 계획이 최소화될 수 있도록 고려한다.

5) 대지의 고저차와 출입구까지의 접근로 기울기를 충분히 고려하여 합리적인 레벨을 선정하고, 건물의 주출입구는 인지가 명확하고 노령층의 접근도 용이하도록 계획한다.

6) 대지의 특성 상 대지의 진출입구가 협소하므로 보행영역과 차량영역은 명확히 구분하고, 보행자 안전을 위한 조치(출차경고등, 시인성있는 바닥마감, 횡단보도 등)를 적극적으로 반영하며, 대지 내 주차동선은 최소화되도록 계획한다.

6) 장애물없는생활환경(Barrier-Free)인증 기준에 부합하도록 보행자 진입로를 1/18이하, 유효폭 1.5m이상으로 계획하고, 합리적인 1층 레벨을 수립한다.

7) 건축물을 배치하고 남은 유휴부지는 대지의 자연현황을 최대한 유지한다.

다. 평면계획

가) 다목적강당

- 운영프로그램: 다양한 체육활동

- 다양한 용도로 활용 가능하도록 하나의 개방된 공간으로 계획한다.

- 배드민턴 2면을 사용하도록 계획하여야 한다.

(배드민턴 코트 크기: 길이 13.4m, 너비 6.1m, 대각선의 길이 14.723m)

- 운동하기에 적절한 재질의 바닥마감과 배드민턴 체육활동이 가능한 일반규격의 층고를 고려한다.

- 체육활동의 특성을 고려하여 충돌 등 안전사고를 대비하여 내부마감재를  선정한다.

- 주민교육이나 행사, 공연 등 문화 프로그램 운영에 활용될 수 있도록 무대공간을 계획하고, 부속실을 고려하여 조명/음향시설 설치하고 창고, 대기공간으로도 활용한다.

- 다목적강당에서 부출입구를 계획하여, 동선연결 및 피난시에도 용이하도록 계획한다.

- 다목적강당은 24시간 개방하여 시간의 제약없이 이용하도록 하며 공간대관을 통해 다른 지역 사람들도 이용할 수 있으며, 대관료는 시설 운영 및 관리비 목적으로 사용한다.

- 운동하기에 적절한 재질의 바닥마감과 높은 층고를 통한 공간 내 개방감 을 부여한다.

2) 관리시설 및 공용공간

- 운영프로그램: 체육센터 운영, 관리를 위한 사무공간

- 시설운영 관리를 위한 소규모 사무실을 조성한다.

- 사무실 내에는 각종 통신 보완장비를 설치할 수 있도록 고려한다.

- 부속실 기능의 창고와 연계하여 계획한다.

- 공용공간 (일반화장실(남,여), 장애인화장실(남,여), 샤워탈의실(남,여), 홀복도)는, BF인증기준에 적합하도록 공간을 확보한다.

3) 기타사항

- 건축물의 이용을 극대화 할 수 있도록 계획하며 피난규정 등 제반법규에 적합하도록 계획한다.

- 외부 바닥, 주출입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용한다.

라. 입면·단면계획

1) 사용재료는 친환경적이고, 내구성 및 유지관리가 우수한 것으로 설계한다.

2) 창의 크기는 개방감과 실의 기능 및 에너지효율 등을 충분히 고려한 크기로 계획한다.

3) 건물 전체의 주변과 조화를 해치지 않는 범위에서 색채계획을 한다.

4) 지붕 및 캐노피는 설해를 고려하고, 원칙적으로 빙설이 녹아 떨어지지 않는 형상이어야 한다. 경사지붕 등은 도로, 인접지 및 부지 내 통로와 시설 사이에 충분한 간격을 두어 위험 방지에 노력한다.

5) 공간의 용도에 맞고 쾌적한 환경(환경·일조) 및 친환경적인 채광과 환기를 고려한 밝고 쾌적한 공간이 될 수 있게 계획한다.

6)) 주변 상황, 각 공간의 기능 및 면적, 천정고, 건물의 평면, 입면, 구조, 마감 및 건축설비 등 다양한 조건을 고려한 적정한 층고를 산정하여 경제적이고 명쾌한 단면계획이 되도록 한다.

7) 냉·난방 배관, 급·배수관 등을 원활하게 설치할 수 있도록 층고 및 천정 마감선을 고려한다.

마. 동선계획

1) 대지진출입구 및 대지내 차량동선과 보행자동선을 명확하게 구분하고 보차혼용구간을 최소화하며, 장애인주차구역에서 주출입구까지 동선이 용이하도록 계획한다.

2) 화재 등 재해 시 소방차 등 대형차량의 진․출입에 지장이 없도록 대피동선 및 원활한 소방동선을 계획한다.

3) 이용자 특성별 동선을 구분하여 쾌적한 배치계획을 하고 사고발생 시의 피난(방화, 보안)에 효율적인 동선을 감안하여 계획한다.

4) 주차공간은 8대이하 주차대수(장애인주차 1대를 포함)를 확보한다.

* 주차장법 시행규칙 부설주차장 구조 ‧ 설치기준을 준용한다.

바. 구조 계획

1) 구조설계 시 내진설계를 필히 반영하여야 하며 건축물의 목적, 규모, 예산, 및 관련 법규상의 제약 등에 따라서 그 건축물에 가장 적합한 구조방식을 채택한다.

2) 목구조 형식의 디자인을 계획할 경우 장기, 단기 하중 및 지진에 의한 처짐과 비틀림 방지 등 구조체 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계해야 한다.

3) 구조물의 균열 발생을 최소화 할 수 있도록 계획하여야 하며, 지진이나 신축 등으로 인한 유해한 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

4) 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

5) 구조설계는 관계법령 및 건축구조기준(대한건축학회)에서 규정한 자격이 있는 책임기술자가 하여야 한다.

6) 기초구조 및 구조형식 결정은 대지의 지질조사를 하고 그 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조로 결정토록 한다.

7) 기능에 적절한 스팬, 층고 등을 결정하고 경제성을 검토하여야 한다.

사. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 함

2) 사용자재는 KS제품 사용을 원칙으로 하며, 국내 자재 중 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 유리 등 취성재료를 외장재로 사용하는 경우 구조안전확인을 포함된 사용계획을 수립하고 구조분야 설계에도 반영함

4) 서로 다른 물성을 가진 재료(콘크리트와 철골 등)를 혼합하여 사용할 경우, 접합부의 상세 내용에 대한 정보를 제공하여야 함.

5) 소방관계법에 의한 방염기준을 적용한 자재를 사용한다.

6) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계한다.

7) 자재 및 장비선정 시 설계의 의도와 부합되지 않는 한 조달청 우수제품 및 신기술제품 등의 사용을 검토한다.

4.1.2. 토목분야

가. 일반 사항

1) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되, 부지조성에 관한 사항은 기 수립된 사항을 적용하되 필요시 발주기관과 협의하여 변경하도록 한다.

2) 과업수행자는 반드시 현장답사를 실시하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 분석하여 지역적인 여건 및 장래계획, 배수상황 등 제반 주변 사항을 검토하여 경계를 확정하고 조사 내용은 기본설계에 반영하여야 한다.

3) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획 평면도는 세분하여 작성한다.

4) 공법 및 재료의 선택 등은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하고 비교·검토하여 가장 적합한 공법과 재료를 선택, 사용한다.

5) 건축설계도서를 바탕으로 토목 설계도서가 반영될 수 있도록 작성한다.

6) 본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

나. 토공 및 흙막이 설계(필요시)

1) 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 양질의 토사를 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획한다.

2) 용역 수행자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영한다.

3) 추후 실제 토사 반출량에 대한 정산이 가능하도록 설계도서를 상세히 작성한다.

4) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성(Trafficability)을 확보토록 한다.

다. 우․오수 설계

1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계한다.

2) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영한다.

3) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정한다.

4) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

5) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치한다.

6) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리하는 분류식으로 한다.

7) 하수도의 형상 및 규격은 합리성 및 경제성을 감안하여 검토하며 이용시 하수유출이 되지 않는 수밀공법과 수밀시험이 가능하도록 재료 등을 사전에 발주기관의 승인 후 설계한다.

8) 하수도 구배는 부유물의 침전이 없고 하수가 누수 되지 않도록 하며 역류영향 등을 세밀히 검토하여 결정한다.

9) 하수도 기초공은 지반의 종류에 따라 관의 침하 등을 감안하여 설계한다.

10) 추후 주변 부지 및 도로로 우수가 범람하지 않도록 설계 최대 유량에 여유를 두어 설계하도록 한다.

라. 기타

1) 부지 경계부근은 도로, 인접 토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치한다.

2) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정한다.

3) 사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영한다.

4) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

5) 부지 내 보도는 미관을 고려하여 소형 고압 블록 및 기타 투수성 재료 등으로 색상과 모양을 고려하여 설계하여야 한다

6) 도로 및 주차장의 모퉁이변 처리는 도로의 폭원과 교차각, 차량의 규격 등을 고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소곡선반경 및 차선폭을 확보하여야 한다.

7) 장애인의 이동권 보장을 위한 보차도 경계석의 턱 낮추기와 점자블럭 등을 관련 시설기준에 맞게 설계하여야 하며, 보도상 자동차의 진입을 억제하기 위한 단주(bollard)설치가 필요할 경우 「보도설치 및 관리지침(국토교통부)」에서 정하는 기준에 맞게 설계하여야 한다.

4.1.3. 기계설비 분야

1) 냉난방설비, 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주기관의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

2) 건축물에 설치되는 기계설비는 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」과「건축물의 에너지절약 설계기준」을 준용하여 위생적이고 경제적인 설계를 한다.

3)「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 규정된 고효율기자재를 검토 반영하여 유지관리 및 효율적인 기기 시스템을 선택한다.

4) 기기 배치는 공간의 실효성을 극대화하여 배치하고 설비의 도장 및 보온방법 등은 색상 및 효율, 주변 여건을 고려하여 적절한 방법을 제시한다.

5) 건축, 토목, 전기․통신, 조경 등 타 분야와 연계되는 사항을 면밀히 검토하여 원활한 시공 및 기능을 유지토록 설계한다.

6) 급탕설비가 필요하다고 인정되는 곳은 급탕 사용량, 사용빈도, 위치 등을 고려하여 적절한 방식을 선정한다.

7) 위생기구는 K.S 제품 또는 동등 이상 품을 사용하며 절수용으로 설계한다.

8) 열원기기는 운전 및 유지보수가 편리하고 경제성, 내구성, 안전성이 있는 시설로 계획하며

9) 구획별, 시간대별 냉난방 시간 및 부하량의 편차가 많고, 운전시간이 다양한 점을 고려하여 열원, 공조 등 시스템 선정시 에너지 소비량 해석을 통한 용도별, 시간대별 제어 가능한 시스템으로 구축하도록 한다.

10) 고효율에너지기자재 또는 에너지효율 1등급 제품으로 에너지소요량을 최소화하고 신·재생에너지 이용으로 에너지자립률을 높이도록 설계한다.

4.1.4. 조경분야

가. 일반 사항

1) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 건물, 주차장 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획

2) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획

3) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 녹지공간 등을 종합적으로 고려하여 계획

4) 시설의 이용자의 편의 및 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계

5) 건축설계도서를 바탕으로 조경 설계도서가 반영될 수 있도록 작성

나. 조경 수목

1) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정한다.

2) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영한다.

3) 대상지내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계한다.

4) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 거리를 확보한다.

5) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

6) 병충해, 전정, 동절기 보온 등 유지관리가 용이한 수목을 선정한다.

7) 오염에 강하고 계절감이 있는 수목구성으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

다. 조경 시설물 등

1) 벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등 시설물은 이용자들의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려

2) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이

3) 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적인 재료를 사용한다.

4) 필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하며, 이 경우 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려해야 한다.

5) 케이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인 또는 적용안의 설치 위치는 안을 작성하여 발주기관과 협의하여 결정한다.

4.1.5. 전기설비 분야

가. 일반사항

1) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

2) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

3) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

4) 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

5) 최근 개정된 법령 중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

나. 수변전 설비

1) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

2) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

3) 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

다. 동력공사

1) 전동기의 용량에 알맞는 개폐기 및 전선굵기로 선정하여야 한다.

2) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

3) 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

4) 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

라. 조명설비공사

1) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

2) 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 실폭 등을 고려하여야 한다.

3) 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토하여야 한다.

4) 건축물의 부분경관조명, 옥외가로조명, 부분연출조명을 고려 계획안을 감독원과 협의 결정한다.

마. 전열공사

1) 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

2) 용도에 알맞는 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

4.1.6. 정보통신 분야

가. 일반 사항

1) 시설 및 사무실의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다

2) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

3) 설계시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록  하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

- 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

4) 건축설계도서를 바탕으로 조경 설계도서가 반영될 수 있도록 작성

나. 전화설비

1) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

2) 교환실의 위치, 교환기의 형식 및 전화수구 수량이 적정하여야 한다.

3) 교환대의 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

다. LAN 설비

정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

라. 약전설비공사

1) 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

2) MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

3) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

4.1.7. 소방분야

가. 일반사항

1) 화재의 수평, 수직의 확산을 방지하기 위하여 마감재료의 불연화 및  방화구획 등을 검토하여야 한다.

2) 피난에 따른 동선계획을 수립하여야 하며, 유사시 신속한 대응을 위한  감시 기능의 확립과 비상시에 신속한 피난유도가 가능하여야 한다.

3) 피난유도설비는 비상시 유효작동 여부, 사용법 명시, 성능 유지관리,  피난유도의 조직화 등 관리면에서 효율화를 기하여야 한다.

4) 건축계획 및 기능에 적합한 소방설비 설치 필요성을 검토하고 설계에  반영하여야 한다.

나. 소방설비

1) 소방법규 및 각 시설물의 용도에 적합한 소방설비를 검토하여야 한다.

2) 소방기계 설비는 소화설비, 옥․내외 소화전 설비, 물분무 소화설비,   스프링클러 설비, 제(배)연설비, 연결송수관 설비, 연결살수 설비, 연소방지 설비, 피난설비, 피난기구, 소화수 탱크 설비, 기타 필요한 설비 등 관련법 및 관련화재안전기준에 적합토록 할 것.

3) 소방전기 설비는 비상전원 및 배선, 자동화재탐지설비, 비상경보설비  및 비상방송 설비, 유도등, 기타 필요한 설비 등 관련법 및 관련 화재안전기준에 적합토록 할 것

4.1.8. 신재생에너지분야

가. 신재생에너지 관계법령에 적합하도록 설계하여야 한다.

나. 신재생에너지의 종류 선정 시 주위여건, 유지관리방법 및 비용을 고려하여 설계하여야 한다.

다. 태양광 또는 태양열 선정 시 효율 저하가 생기지 않도록 일조량을 검토하여 적절한 위치를 고려하여야 한다.

제5장 성과품 작성 및 납품

5.1. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공 상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

가. 설계도서 작성은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」(국토해양부 고시 제2020-635호) 별표2. 건축설계에서의 도서작성에 의한 “3종(보통) 상급”으로 작성하여야 한다..

※ 상기기준을 준용하되 발주처와 협의하여 부분적으로 항목 증감, 조정할 수 있다.

나. 감독자는 원활한 용역수행 등을 위하여 제출 부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업이행 요청서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 용역 수행자는 이에 따라야 한다.

다. 용역 수행자는 모든 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 재작성하여 제출하여야 한다.

5.1.1. 설계도서(성과품) 작성구분

가. 도서의 작성은「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」에 의거 작성하여 성과품을 제출한다. 그리고 내역서 작성은 최종 설계도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 물량 등의 착오가 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 건축(토목 ․ 조경포함) ․ 기계 ․ 전기 ․ 통신 ․ 소방 ․ 관급자재 등 공종별로 분리하고 발주단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출 등) 단 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다. 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용한다.

5.1.2. 설계도서(성과품)의 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는「용역계약일반조건」제5조(사용언어)에 의한다.

나. 표기문자 및 숫자는 한글 및 아라비아숫자 사용을 원칙으로 하되, 이해가 곤란한 경우에는 영문 및 한자로 표기할 수 있다.

다. 소수점 이하의 숫자가 있을 경우 셋째자리에서 반올림 한다.

라. 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

마. 모든 설계도서에 작성되는 각 실의 명칭 등은 서로 동일한다.

바. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1~2회 사용되는 경우 원어 사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용한다.

사. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M

6) 전기도면 : E

7) 통신도면 : ET

8) 소방도면 : MF(소화설비), EF(전기소방)

5.2. 성과품의 작성

5.2.1. 중간설계 도서의 작성

가. 선정된 공모안을 발주기관에서 수렴된 사용자협의 결과에 따라 조정하고 이를 실현 가능한 해법을 제시하는 단계로, 발주기관의 요구조건을 반영한 기본설계(안)을 제출하고 승인을 받는다(필요시 2개 이상 대안 제출).

나. 계약상대자가 제출한 안이 부적합하다고 발주기관이 검토의견을 통보하는 경우에는 조속한 시일 안에 새로운 안을 재작성하여야 하며 그로 인한 용역비의 추가 및 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

다. 발주기관이 보완조건으로 설계(안)을 승인하면 계약상대자는 즉시 보완․제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 실시설계를 진행한다.

라. 건축계획서 : 분야별 설계개요 및 설계의도 설명, 전기․설비계통도 등 기본설계 단계에서 필요 및 결정사항을 모두 수록

마. 법규 체크리스트 : 적용이 예상되는 제반법규 및 단계별 법적절차의 검토

바. 대안검토 : 계획의 원칙 및 기준을 제시하고, 계획별 장․단점 비교, 기본설계 채택 과정의 설명(외부 마감재 사양에 따른 대안 제시 포함)

사. 투시도(조감도) : 조감도 및 투시도는 2컷으로 제한한다

5.2.2. 설계도면 작성

가. 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명, 날인한다.

나. 도면은 AUTO CAD로 작성하며, 파일 제출 시 CAD 및 PDF 형태 모두 제출한다.

다. 도면의 크기는 KS A5201의 A1～A3에 준하는 것을 원칙으로 한다.

라. 축적은 실시설계의 축적에 따르되, 도면에 적합한 통상적인 축적을 사용하고 동일 종류에 대하여는 통일시켜야 한다.

마. 각 공종마다 도면목록을 작성하고 방향표시, 단면표시, 상세표시(키플랜) 및 보기를 넣어 쉽게 해당 부분을 찾을 수 있도록 한다.

바. 모든 도면상에는 종 또는 횡의 열 부호를 표시한다.

사. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

아. 설계도면은 누락된 부분이 없고 현장 기술자들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성한다.

자. 마감재료는 부재명, 재료명, 규격(두께×너비×길이), 마무리, 색 등을 표시한다.

차. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 기타 부대설비와 관련하여 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성하고, 공인기관 기술검토서를 첨부하도록 한다.

카. 조감도, 투시도 및 색체디자인 기본계획(내·외장재 색체기본계획을 설계도서에 표시)을 작성한다.

5.2.3. 설계설명서 작성

가. 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

나. 설계개요

1) 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률

2) 주차면적, 조경면적

3) 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도

다. 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사한 내용 표기

라. 기타 각 공종에 대한 설명 및 고려사항 등

5.2.4. 시방서 작성

가. 일반 공통 시방 및 특기시방으로 구분하여 시방서를 작성하되, 일반사항은 국토교통부 제정 공사시방서 작성요령을 준용하고 특기시방서는 일반시방서에서 정하지 않은 시공시 유의사항 및 특별주문사항 등을 구체적으로 명시한다.

나. 일반 시방서 및 특기시방서는 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 구분하여 작성한다.

다. 시공자가 시공 상태를 검토, 확인 받아야 하는 대상공종을 특기 시방서에 명시

5.2.5. 내역서 작성

가. 공사비 총액은 공사원가금액(자재비, 노무비, 일반관리비, 이윤 등의 합산액)으로 하되, 부가가치세를 포함한 금액으로 한다.

나. 설계에 반영되는 자재와 공법을 면밀히 검토하여 최대한 공사비를 절감

다. 물가는 조달청 고시 가격을 원칙으로 한다.

라. 조달청 미수록 단가는 기획재정부에 등록한 전문 가격조사 기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 가격을 적용한다.

마. 견적단가를 적용할 시는 반드시 견적서 원본을 제출(타인견적 2부 포함)한다.

바. 노임은 당해 연도 고시 노임단가를 적용한다.

(단, 납품 후 공사 착공 시 정부 노임 및 단가가 변경되었을 경우 발주기관의 요청에 의거 당해 연도 단가로 보완하여야 한다.)

사. 공사비 적산은 정부 표준품셈 및 건축공사 적산기준에 따라 산정한다.

아. 외국수입자재인 경우에는 수입견적자의 견적서(타인견적 2부 포함)로 설계한다.

자. 「건설기술진흥법」의 산출기준에 따라 안전관리비 및 품질관리비 등을 내역서에 계산

차. 모든 가시설물은 시공이 가능하도록 충분하게 설계하고 내역서에 반영하도록 한다.

5.2.6. 유지관리지침서 등 작성

가. 시설물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성하여야 한다.

나. 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

5.2.7. 예정공정표 작성

가. 예정공정표는 전체 공정을 포함하여 보할공정표의 형태로 작성한다.

나. 예정공정표는「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따른 공사기간을 토대로 작성

5.2.8. 이동식저장장치(CD 또는 USB) 제출

가. 설계도면은 CAD 프로그램으로 작성하며, PDF 전환 파일도 함께 제출한다.

나. 공사내역서 및 산출근거는 EXCEL 프로그램으로 작성한다.

다. 기타 설계도서(설계설명서, 시방서, 계산서 등)는 한글 프로그램으로 작성한다.

라. 본 용역과 관련된 모든 설계도서 및 제반서류는 전부 파일로 제출하도록 한다.

5.2.9. 설계도서 검토

가. 검토 방법

1) 설계시행 책임기술자가 검토

2) 각종계산서 확인 검토

3) 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

나.  제출도면

검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토도면 2부 제출

다. 제출시기 : 중간검토 및 준공 시 제출

5.3. 용역비 산정 및 지불

가. 설계비의 산정은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」을 기준으로 산출한다.

나. 실시설계에서 산출된 공사비가 당초 용역비 산출 때 적용한 공사비 보다 적을 경우, 세부설계 공사비에 맞추어 용역설계 금액을 정산한다. 단, 실시설계시 산출된 공사비가 당초 용역비 산출 때 적용한 공사비보다 초과 시 발주기관과 공사비 및 용역 설계금액을 협의 하에 결정한다.

다. 용역비 지급은 정부 예산규정에 따른다.

라. 용역대가의 최종  지급시기는 1)의 조건을 완료 후 대가의 지급을 청구 받은 날로부터 7일 이내에 대가를 지급한다.

마. 제시 기준 면적에 대한 설계면적 증감에 따른 용역비는 정산하지 않는다.

5.4. 기타

5.4.1. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

1) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 및 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정·고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매토록 규정하고 있으므로 관련 법규에 따라 관급자재를 선정하여야 한다.

나. 과업수행자는 상기 규정에 의거 해당하는 자재 리스트 및 관급자재 선정 검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

다. 관급자재 및 주요자재는 선정검토서(3개 이상 자재의 품질, 가격 등 비교)를 작성하여 발주청의 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 하며 승인받지 않은 자재 계획 시 발생하는 모든 문제점(용역기간 지연 등)은 용역 수행자가 책임져야 한다.

5.4.2.. 인허가 인증관련 업무

1) 과업의 내용

- 각 인증 자료 및 제출 서류의 준비

- 각 인증심사를 위한 자체평가서 작성 및 신청

- 각 인증의 신청 후 보완 등의 업무

- 인증서 취득(모든 예비인증은 설계용역 완료 전 취득해야함)

2) 최종성과품

- 인증서 각 1부.

- 각 인증별 자체평가서 및 근거자료 각 3부.

- USB(모든 서류 포함) 각 1부.

제6장 납품목록

6.1. 계획설계 납품도서목록

설계공모작품에 따른 건축, 구조, 기계, 토목, 조경 등에 대한 기본 계획안 제출

※ 납품도서는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 [별표 2 건축설계에서의 도서작성] 제1항 계획설계의 도서내용(상급)을 참고하여 작성 및 제출한다

6.2. 중간설계 납품도서목록 (*전 공정(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방))

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	중간설계 보고서*	A4	4	부	∙ 건축계획서 ∙ 법규체크리스트 ∙ 현장조사보고서, 대안검토 ∙ 개략공사비 내역서 등
2	설계 도면*	A3	4	부	전 공종 분리
3	내역서	A4	4	부	외장 및 내부 주요실(바닥,벽,천장), 마감재 사양 및 색상표(색상번호기재), 색상대비표 제출
4	투시도(조감도)	-	4		스케치업 모델링 이미지컷
5	각종 인․허가 관련 심의도서	A4	4	부	각종 심의용 파워포인트 등(필요시)

※ 납품도서는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 [별표 2 건축설계에서의 도서작성] 제 항 중간설계의 도서내용(상급)을 참고하여 작성한다. (붙임. 6 참고)

※ 모든 성과품의 제출시기와 수량 등은 발주처와 협의하여 변경 될 수 있다.

※ 설계도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다. 단, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 설계공모 심사위원 의견 및 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 이동식 저장장치로 제작하여 제출한다. (단, 수량은 협의가능)

3. 실시설계 납품도서(*전 공정(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방))

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	1부로 작성
2	설계설명서	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○
3	설 계 도 면*	A3	5	부	○	○	○	○	○	○	○	반접이포함
4	계 산 서*	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○
6	내 역 서*	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○
7	관급내역서*	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○
8	수량산출서*	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○
9	단가산출서*	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○	견적서 포함
10	일 위 대 가*	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○
11	일반시방서*	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○
12	특기시방서*	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○
13	관급시방서*	A4	5	부	○	○	○	○	○	○	○
14	공정표*		1	부	○	○	○	○	○	○	○
15	이동식 저장장치 (USB)*		1	SET	○	○	○	○	○	○	○	공정별 통합
16	인허가자료		1	식								인증용역 포함
17	공사계약요청자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, XML file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등
18	자재 견본 자료*	A4	2	SET
19	기타 발주기관 요구사항*

※ 납품도서는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 [별표 2 건축설계에서의 도서작성] 제 3항 실시설계의 도서내용(상급)을 참고하여 작성한다.

※ 모든 성과품의 제출시기와 수량 등은 발주처와 협의하여 변경 될 수 있다.

※ 폐기물처리는 관련규정에 의거 100Ton이상 시 분리발주로 별도 제작 제출

※ 지적사항, 검토사항 반영 결과보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 이동식 저장장치로 제작하여 제출(수량 협의)하되 “준공도서 사본 작성 관리지침(국토해양부)”을 참조하여 제작한다.

※ 종결보고서: 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

붙  임  1. 보안각서

2. 청렴서약서

3. 책임 기술자 선임계

4. 설계 검사원(중간, 실시)

5. 공정보고

6. 설계도서표지 및 제본양식

별  첨  1. 설계용역 보고서상의 참여기술자 명기 양식

〔붙임 1〕

보  안  각  서

1. 용 역 명 :

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 완수예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 저작권법 및 관련 행정규칙 등에 준수하여 따른다.

20   년   월   일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술 분 야 :

성        명 :                   (인)

충청남도 예산군수  귀하

〔붙임 2〕

청 렴  서 약 서

1. 용  역  명 :

2. 계약상대자 :

당 사는 위 공사의 설계에 반영되는 관급자재 선정을 위한 심의(안) 작성에 있어 관계 법령 등에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명하게 관급자재가 선정될 수 있도록 최선을 다할 것이며, 설계용역 수행과정에서 관급자재를 납품하고자 희망하는 업체에게 어떠한 금품ㆍ향응이나 부당한 이익을 제공받지 않을 것을 확약합니다.

만약 이를 위반할 시에는 어떠한 처벌이나 불이익 조치도 감수하겠으며, 발주기관의 조치와 관련하여 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20   .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

충청남도 예산군수  귀하

〔붙임 3〕

책임 기술자 선임계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 :

4. 착수일자 :

5. 완수예정일 :

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

충청남도 예산군수  귀하

〔붙임 4〕

설계 검사원(계획, 중간, 실시)

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 :

4. 착수일자 :

5. 완료예정일 :

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

충청남도 예산군수  귀하

〔붙임 5〕

설계도서 표지 및 제본의 형식

구 분	실 시 설 계
설계도면		(측) (전면)
		응봉면 기초생활거점조성사업 한마음체육센터 조성사업(○○분야)	응봉면 기초생활거점조성사업 한마음체육센터 도면명 20 . . 예산군
각종서류		(측) (전면)
		응봉면 기초생활거점조성사업 한마음체육센터 조성사업(○○분야)		응봉면 기초생활거점조성사업 한마음체육센터 도면명 20 . . 예산군

◦제출도서 표지의 글씨는 한글 고딕체(진하게) 하고 색채는 흑색으로 한다.

◦표지용지는 레자크지 #75 250ｇ/㎡로 한다. (제출되는 제반도서 포함)

※ 별첨:  1. 설계용역 보고서상의 참여기술자 명기양식 1부.

〔별첨 1〕

설계용역 보고서상의 참여기술자 명기 양식(예시)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◦ 용 역 명:

◦ 용역기간:

분야별	참 여 기 술 자						비 고
	소 속 업 체 명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	주민등록 번 호	자 격 증 번 호
							※협력용역업체 소속기술자는 소속업체명을 기재할 것.

※ 비고란에는 참여기술자 등급을 기재(예:특급, 고급)