『퀀텀융합연구동 건립사업 설계용역』 과 업 내 용 서

2025. 8.

-  목          차  -

제1장 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 개요	1

3. 과업의 범위	2

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	5

2. 업무보고 및 회의	9

3. 설계에 사용하는 재료	11

4. 에너지절약형 건축물 설계	11

5. 설계의 경제성 등 검토 (설계VE)	12

6. 보안성 검토	20

7. 민원발생 방지대책 수립	20

8. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	21

9. 기존 건축물(마프터플랜 포함) 및 기반 인프라 도면 제공	21

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	22

2. 설계 일반 지침	24

3. 분야별 지침	27

4. 설계진행 시 유의사항	37

5. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인	38

6. 설계도서의 분리작성	39

7. 설계도서 표기	39

8. 도면작성	39

제4장 설계도서 작성요령

1. 일반 사항	41

2. 공통 사항	41

3. 계획 설계	42

4. 중간 설계	46

5. 실시 설계	55

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서	64

2. 중간설계 납품도서	64

3. 실시설계 납품도서	65

〔붙임 1〕 보안각서	67

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계	68

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서	69

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원	71

〔붙임 5〕 주간공정보고	72

〔붙임 6〕 월간공정보고	73

〔붙임 7〕 특정자재사용리스트	75

〔붙임 8〕 Space Program	76

〔붙임 9〕 사업부지 현황	77

〔붙임 10〕 표준설계관리일정표	78

〔붙임 11〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식	79

〔붙임 12〕 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표	79

〔붙임 13〕 설계안전보건대장 작성 세부사항	80

제1장  총 칙

1. 과업의 명칭 : 퀀텀융합연구동 건립사업 설계용역

2. 과업의 개요

가. 대지위치 : 대전광역시 유성구 대학로 291 KAIST 본원캠퍼스 내 부지(구성동 23)

나. 건축규모

1) 연면적 : 7,500㎡(약 2,273평)

2) 건폐율/용적율 : 법정 건폐율/용적율 이하

3) 규모 : 지하2층, 지상7층

3) 용도 : 교육연구시설(연구소)

※ 건축규모는 설계 진행과정에서 한국과학기술원 건설2팀 및 교무팀(이하 “발주기관”이라 한다)과 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 협의하여 조정 될 수 있으며, 제반법규 적합여부는 별도 검토하여야 함

※ 과업범위의 변경이 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.(용역계약 일반조건 등 참조)

다. 건설비 예산액 : 금 26,620,000천원(VAT포함)

1) 제시된 예산액은 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함하여야 한다.(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음

2) 낙찰차액을 감안해서는 안 됨(공사예정가격이 예산을 초과할 수 없음)

3) 공사비 조정 협의 시 관련 검토 자료를 작성한다.

라. 과업기간 : 착수일로부터 300일(공휴일 포함)

1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

나) 용역계약일반조건 제24조(불가항력)

다) 용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시정지)

라) 용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 기술용역 정지 등)

마) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

바) 수요기관의 사업비 조달계획에 따른 용역기간 조정 요청 시

3) 용역비 지급은 계약 후 선급금(30~50%), 설계과업 완료 후 준공금(40~60%), 건설공사 준공 후 유보금(10%)을 적용 (발주처 예산 편성 여건에 따라 변경될 수 있음)

3. 과업의 범위

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 실시계획의 인가 등을 포함한 인허가 협의까지 업무 일체를 포함한다.(철거도서 작성 및 수량산출 포함)

※ 설계용역 성과물은 제반 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다.

※ 건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방, 철거 등 제반 분야의 기본 및 실시설계용역 수행 등의 비용을 말한다. 녹색건축 예비·본인증, 제로에너지건축물 예비·본인증, 설계경제성 검토(VE) 용역비용 및 지반조사비용, 현황측량, 각종 인증에 필요한 수수료는 설계용역비에 별도 산정되어 포함됨.(수수료 실납부액이 산출내역과 상이할 경우 발주처와 협의)

※ 계획설계, 중간설계, 실시설계 각 단계별 설계공정계획을 수립하여야 한다.

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원해야 한다.

※ 본 설계용역이 완료된 후라도 입찰방법 심의 등에 따른 서류보완이 필요할 경우 발주자의 요청에 적극 협조하여야 한다.

다. 현황 측량 및 지반 조사(NX 2공, 내진시험 포함) 실시(용역대가에 포함)

라. 산업안전보건법 제67조에 따른 설계안전보건대장을 작성 및 제출한다.

(*세부작성요령은 붙임13 참조)

마.  건설기술진흥법 시행령 제75조에 따른 설계의 경제성(VE) 검토 실시

(수급인은 설계 경제성(VE) 검토를 위해 별도 전문업체를 선정하여 발주처의 승인을 받아야 하며, 해당 용역비 등 제반비용은 설계과업대가에 포함됨)

바. 건설기술 진흥법에 따른 설계의 안전성 검토대상 건축물에 해당될 경우  설계안전성검토보고서를 작성하여 발주자의 승인을 받아야 한다.(보고서 작성 및 제반비용인 부담)

사. ‘바’항에 따라 설계의 안정성 검토를 실시하는 경우, 검토비용(수수료)은 수급인이 부담한다.(설계과업대가에 포함됨)

아. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 합동토론회 발표자료 작성 및 조치사항을 설계도서에 반영한다.

자. (해당시) 총사업비관리지침에 따라 사업추진 단계별로 진행되는 협의․조정시 필요한 각종 기술적 증빙자료의 작성 및 보조업무

차. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

카. 지장물 조사

1) 계획구간 내 각종 지하 매설물 및 지상 시설물에 대해 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계에 반영한다.

2) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상수도관, 하수도, 가스관, 통신케이블, 조경, 옥외비상발전기, EHP실외기 등) 및 우회도로 조성 등은 발주처와 협의하여 비용을 산출하여 사업비에 반영하며 필요 시 발주처가 선공사 할 수 있도록 설계도서 작성을 지원해야한다.

3) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

타. 인․허가 업무

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 수급인이 대행하여야 한다.

2) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 본 과업의 사전재해영향성평가, 교통영향평가 등 각종 영향평가, 문화재보존영향 관련 인허가, 도시계획시설결정(변경) 및 실시계획의 인가를 실시할 경우 수급인은 각종 용역업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조하여야 한다. (인허가관련 각종 용역 필요 여부 검토 포함)

4) 수급인은 향후 사용승인 신청시 준공도서 작성, 인장날인 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

5) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시에 다음 서류를 제출한다.

1) 착수계 1부

2) 수행조직도 1부(비상연락망 기재)

3) 전체 참여기술자 현황 및 명단 1부
(분야, 성명, 구체적 업무내용, 기술등급, 자격종목, 참여기간, 생년월일 등)

4) 사업 및 분야별 책임기술자 선임계 1부
(자격증 사본, 건설기술진흥법에 의한 경력증명서) [붙임 2]

※ 공동, 분담이행일 경우 대표자 선임계 제출

※ 하도급 공종은 하도급승인요청서에 첨부

5) 각 공종별 참여기술자 서류 1부
(자격증 사본, 건설기술진흥법에 의한 경력증명서)

※ 하도급 공종은 하도급승인요청서에 첨부

※ 각 공종(하도급 포함) 참여기술자 변경 시 즉시 변경승인 요청 할 것

※ 건설기술진흥법 제21조에 따른 경력신고 시 명단포함 기술자만 신고

6) 과업수행계획서 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

※ 붙임의 표준설계관리일정표를 참고하여 설계용역과 관련 일정을 모두 포함하여 당해 사업특성에 맞게 조정하여 제출

8) 계약금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

11) 보안각서 각 1부 [붙임 1]

※ 보안각서 제출자만 용역에 참여할 수 있음

※ 하도급 공종은 하도급승인요청서에 첨부

12) 기타 관련서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서,
사용인감계, 등기사항 등) 1부

13) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며,
위 ‘가’호로 승인된 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 계약상대자는 계획설계 납품검사원 제출 7일 전 다음 서류를 사업담당 감독원에게 제출하여 협의·확인을 받아 각 3부를 제출하여야 한다.

1) 주요내용

가) 관련법규검토

나) 배치, 평면, 입면안 계획(3개 대안)

다) 구조공법 검토

라) 설비공법 검토

마) 현장조사의 적정성 검토

바) 수요기관 요구 적용 여부

사) 기계, 통신, 소방 계획

2) 관련법규 검토서(건축법, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 등)

3) 수요기관 요구사항 반영 도면

4) 기존 시설물 철거에 따른 설계도서는 우선 작성하여 납품

5) 관련서류를 포함한 CD

라. 계획설계도서 납품 (감독관 협의 및 검토결과 반영)

1) 계획설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

※ 설계자가 제시한 3개 대안 제출(비교검토표 포함)

3) 관련법규 검토서

4) 현장조사 결과보고서

5) 현황측량 성과도

6) 유사시설 견학보고서

7) 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

8) 지반조사보고서

9) 기타 발주기관 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단되는 사항

마. 계획안은 본교에서 제시하는 과업내용서를 분석하여 기능에 알맞은 평면배치, 구조 및 부대시설을 포함한(안)을 작성하여 계획설계 납품 후 본교의 승인을 득하고 나서 중간설계에 착수하여야 한다.

바. 계약상대자는 중간설계 납품검사원 제출 7일 전 다음 서류를 사업담당 감독관에게 제출하여 협의·확인을 받아 각 3부를 제출하여야 한다.

1) 주요내용

가) 공사비 검토(총괄, 분야별)

나) 설계도면 검토(분야별)

다) 공정표

라) 구조계산서 검토

마) 예산초과 시 절감방안 검토

바) 부하계산서 검토

사) 관급자재 선정 반영 검토

2) 개략공사비 내역서

3) 공종별 설계도면

4) 공사시방서(초안)

5) 구조계산서 등 계산서, 물량산출서

6) 예산초과 시 예산절감방안 검토서

7) 관련서류를 포함한 CD

사. 중간설계도서 납품 (감독관 협의 및 검토결과 반영)

1) 중간설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 중간설계도서

4) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산 비교 등)

5) 녹색건축 인증 일반등급 취득 관련 검토서 및 자료

6) 건축물 에너지효율 1++등급 취득 관련 검토서 및 자료

7) 제로에너지 취득 관련검토서 및 자료, 한국에너지공단 및 인증기관 제출서류

8) 예산초과 시 예산절감방안 검토서

9) 기타 발주기관 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

아. 설계VE 반영결과 제출

1) 설계VE 보고서, 설계VE검토 보고서(설계자)

2) 설계VE 검토(설계자), 확인, 반영된 설계도면

3) 설계VE 검토(설계자), 확인, 반영된 시방서

4) 설계VE 검토(설계자), 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

5) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

자. 계약상대자는 실시설계 납품검사원 제출 7일 전 다음 서류를 사업담당 감독관에게 제출하여 협의·확인을 받아 각 3부를 제출하여야 한다.

1) 주요내용

가) 설계설명서 검토(분야별)

나) 실시설계납품도서

다) 실시설계도면 검토

라) 발주용 내역서 검토

마) 공사시방서 검토

바) 구조계산서 검토

사) 물량산출서 검토

아) 단가산출, 견적서 검토

자) 분야별 크로스 체크

2) 내역서(원가 제비율)

3) 인허가용 설계도면

4) 계산서 및 물량산출서

5) 단가산출서, 견적서

6) 관련서류를 포함한 CD

차. 실시설계도서 납품 (감독관 협의 및 검토결과 반영)

1) 실시설계 검사원 [붙임 4]

2) 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

- 국토교통부고시 제2024-1021호(공공 건설공사의 공사기간 산정기준)

5) 종결보고서(PPT 자료)

6) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

7) 설계검사원

8) 건축물 에너지효율 예비인증서

9) 제로에너지 건축물 예비인증서

10) 녹색건축 예비인증서

11) 에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류

12) 손해배상보험증권(보증기간은 공사준공일까지 산정)

13) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

카. 기타 서류

1) 용역의 공정보고

가) 주간공정보고 [붙임 5]

나) 월간공정보고 [붙임 6]

2) 설계 경제성(VE) 반영결과 제출 : 반영된 설계도서

(예산절감내역 전·후 대비표)

3) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

≪수급인은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야한다≫

가. 업무보고

1) 주간업무(공정)보고

- 매주 목요일 오후 4시(협의 후 변경 가능)까지 붙임 양식에 따라 발주기관에 전자우편으로 제출한다.

2) 월간업무(공정)보고 : 매월 말 오후 4시까지 전자우편으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 따라 제출한다.

3) 수시보고 : 설계용역진행 중 문제점 발생 시 발주처의 요구에 따라 문제점을 분석하여 해결방안을 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의(각 보고회 시 사업책임기술자 참석 필수)

가) 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획설계 보고회

- 수급인은 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 발주기관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4) 중간설계 보고회

- 수급인은 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 발주기관과 사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

5) 실시설계 보고회

- 수급인은 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 발주기관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

6) 수시회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

7) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

8) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 설계에 사용하는 재료

가. 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 따른 고효율에너지기자재를 사용한다.

나. 인체에 유해한 물질이 함유된 자재는 사용을 할 수 없으며, 가능한 친환경 자재의 사용을 고려한다.

다. 관급자재의 선정

1) 근거 규정

- ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙’ 제83조

- ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령’ 제11조

- ‘조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준’

2) 수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

3) 설계자는 관급자재 선정심의에 필요한 자료 작성 시 발주기관과 긴밀히 협조하여 관급자재 선정 심의 운영에 적극 협조하여야 한다.

4. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)

2) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시)

3) 건축물 에너지효율등급 인증 기준(국토교통부 고시)

4) 녹색건축 인증 기준(국토교통부 고시)

5) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. ‘건축물의 에너지절약 설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 한국에너지공단과 에너지절약 사전협의 실시

다. 건축물 에너지효율 1++등급 및 녹색건축인증 일반등급, 제로에너지 건축물 ZEB 5등급 이상의 예비인증을 취득하여야하며, 취득에 필요한 수수료 및 기타비용(컨설팅비용 등)은 수급인이 부담한다

5. 설계의 경제성 등 검토(VE)

가. 일반사항

1) 목적

설계의 경제성 검토(VE)는 「건설기술진흥법시행령」제75조(설계의 경제성 등 검토)의 규정에 의한 설계의 경제성 등 검토 용역 업무를 수행함에 있어 상기 사업의 예산절감, 기능향상, 구조적 안전 및 품질을 확보하고자 하는데 목적이 있다.

2) 검토대상 시설개요

대상 사업	연면적	층 수	비 고
퀀텀융합연구동 건립	7,500㎡	지하2층, 지상7층

3) 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 계약상대자가 상호 조정할 수 있으며, 과업수행 상 필요하다고 인정되는 경우 계약상대자는 발주기관의 의견을 최대한 존중하여 성실하게 수행한다.

4) 과업의 수행방법

○ 설계의 경제성 등 검토 실시시기 : 발주처가 요구하는 시점(1회 이상 진행)

○ 관련법 및 규정에 의한 설계의 경제성 등 검토 실시

나. 일반지침

1. 관련규정

○ 설계의 경제성 등 검토용역을 시행함에 있어 본 설계용역의 과업내용서, 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시 제2021-981호<2021. 7. 23.>) 및 아래의 각종 시방서 및 규정에 의하여 수행하여야 한다.

가. VE업무 매뉴얼

나. 공공건설사업 VE 적용 사례집

다. 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신공사 표준시방서

라. 신․재생에너지설비의 지원/설치/관리에 관한 기준

마. 건축물의 에너지절약 설계기준

바. 친환경건축물인증제도 세부시행기준

사. 기타 건설공사 관련 법령 및 규정

2. 설계VE 검토조직의 책임자 기본업무

"설계VE 책임자"는 발주기관의 권한을 대행하여 본 계약에 의해 독립적으로 그 업무를 성실히 수행하고 설계용역업자가 시행하는 실시설계에 적극 협조하여야 한다.

3. 설계VE 검토조직의 업무자세

설계의 경제성등 검토업무에 종사하는 자는 그 업무를 성실히 수행하고, 건설공사의 예산절감, 기능향상, 구조적 안전 및 품질확보 추구에 노력하여야 하며, 품위를 유지하여야 한다.

가. 팀원은 법률과 이에 따른 명령, 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하지 않으며, 품위를 유지 하여야 한다.

나. 팀원 담당업무와 관련하여 제3자로부터 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 안 되며, 업무를 수행함에 있어서 성실, 친절, 공정, 청렴결백하게 업무를 수행하여야 한다.

다. 팀원은 설계 품질향상을 위하여 적극적으로 기술개발 및 보급에 전력하여야 한다.

4. 설계VE 검토조직의 근무지침

가. 당 설계VE 용역의 팀원은 본 사업목적에 부합되도록 검토에 임해야 한다.

나. 당 설계VE 용역의 팀원은 그 업무를 수행함에 있어서 실시설계용역 과업내용서 및 본 설계의 경제성 등 검토용역 과업내용서 기타 관계규정 등의 내용을 숙지하고 실시설계의 특성을 파악한 후 업무에 임해야 한다.

다. 당 설계VE의 팀원은 실시 설계시 문제점이 발생되거나 설계에 관련한 중요한 변경사항이 있을 때는 발주기관에게 보고하고 그 지시를 받아 업무를 수행하여야 한다.

라. 본 용역업체 대표 및 책임자 및 팀원은 검토가 완료된 후라도 감사기관의 수감요구가 있을 경우에는 이에 응하여야 한다.

마. 팀원은 필요시는 설계진도에 따라 설계용역회사에 출장하여 설계용역사로부터 필요한 자료 등을 제출 받아 업무를 수행하여야 한다.

바. 팀원은 특별한 사유가 없는 한 발주기관에서 임명한 용역감독관의 지시를 충실히 따라야 한다.

사. 승인된 팀원은 업무의 연속성, 효율성을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 설계검토용역 완료시까지 근무토록 하여야 하며, 교체가 필요한 경우에는 교체사유를 명시하여 발주기관의 사전승인을 받아야 한다.

아. 설계VE 검토조직은 건축/구조/토목/조경/기계/전기/소방/통신 등으로 설계의 여건에 따라 적정하게 구성하여 실시설계VE 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 하여야 한다.

자. 설계VE 조직의 책임자와 팀원은 비상주 근무를 원칙으로 하되, 발주청의 담당자는 필요시 설계VE 조직원의 일부를 상주시켜 설계VE를 수행할 수 있다.

5. 기타사항

가. 팀원은 본 과업 이외에 발주기관이 필요하다고 판단되는 실시설계에 대하여 자문요구가 있을 경우 이에 응해야 한다.

나. 일반 및 특별 과업내용서에 명기된 내용 이외 견실설계를 위하여 필요한 사항은 발주기관과 협의하여 시행하여야 한다.

다. 용역기간 중 발주기관의 사정(도시계획심의 및 건축협의 시 보완사항 등)으로 설계V.E 용역수행 기간의 조정이 필요한 경우에는 용역기간을 조정할 수 있다.

다. 시행 지침

1. 설계VE 검토조직(책임자 및 분야별 책임자)의 배치기준

가. 설계의 경제성 등 검토 용역을 수행할 수 있는 자는 국가 및 공공기관에서 발주한 설계용역 또는 민자사업에서 설계의 경제성등 검토를 수행한 경력이 있는 자로서 경력 등의 확인에 필요한 서류를 첨부하여 발주자의 승인을 받아야 한다.

나. 사업 책임기술자는 과업내용서에 명시된 업무와 계약조건을 충실히 이행하여야 하며, 모든 중요한 사항에 대하여 감독자와 협의하여야 한다.

다. 용역에 종사하는 기술자는 과업수행계획서에 일치되게 투입되어야 한다. 단, 추가투입이나 사망, 지병, 기타사유로 교체가 불가피할 경우는 교체자는 동등이상의 자격 및 경력자로 하며 발주자의 사전승인을 득하여야 한다.

라. 참여기술자가 과업수행에 부적당하다고 판단되거나 태만하다고 인정될 때에는 해당자의 교체를 요구할 수 있고 수급인은 이에 응해야 하며, 이로 인한 용역과업의 지연이나 용역기간의 연장은 인정되지 않는다.

마. 건설기술관리법 관계규정에 의거 설계용역 참여기술자의 업무내용 등을 구체적으로 보고서에 기재하여야 한다.

바. 설계VE 참여기술자는 본 사업의 설계를 수행하는 설계 용역업체에 소속되지 않은 자로 구성하는 것을 원칙으로 하되, 필요시 당해 사업의 설계자를 검토조직에 포함시킬 수 있다.

사. 책임기술자(설계VE리더)는 해당 자격사항을 충족시키는 기술자를 반드시 보유하여야 하며 이외 분야의 기술자는 외부전문가도 활용가능하다.

※ 책임기술자는 최소한 40시간 이상 VE전문교육과정을 이수하고 CVP(건설VE 전문가), CVS(국제공인 VE전문가)등 전문자격증 소지자이어야 하며, 분야별기술자는 동등(고급)이상의 기술자이어야 한다.

아. 설계VE 검토조직의 각 등급별 인원 및 검토분야는 다음과 같다.

설계VE 조직	담당업무	인원(명)	검토분야	자격사항
책임기술자	- 설계VE 리더	1명	발주기관 권한대행 검토제안 통합보고	CVP(건설VE전문가) or CVS(국제공인VE전문가) or 40시간이상 VE 전문교육 이수자
분야별 기술자	- 건축분야 - 건축구조분야 - 토목분야 조경분야 - 기계ㆍ소방분야 - 전기ㆍ통신분야	분야별 1인 이상	당해분야 설계의 경제성 등 검토제안	해당분야 전문기술자이상
계		7명이상

2. 검토조직의 업무범위

가. 대상공사의 설계자료 수집

나. 설계의 경제성 등 검토를 위한 사전검토자료 준비

다. 설계의 경제성 등 검토 추진계획 및 검토조직의 구성

라. 설계 계획안의 적정성 검토 및 대안 제시

마. 각종 구조물의 형식 선정의 적합성 검토 및 대안 제시

바. 신공법, 특수공법 적용성 검토 및 대안 제시

사. 공사기간 및 공사비(생애주기비용-LCC)의 적정성 검토

아. 설계의 경제성 등 검토 결과보고서의 작성

3. 특별지침

가. 일반사항

1) 설계의 경제성 검토업무는 국토교통부고시 제2021-981호<2021. 7. 23.>의 설계의 경제성검토에 관한 시행지침에 따라 시행한다.

2) 설계의 경제성 등 검토업무를 통해 선택된 개선안 또는 변경안을 발주처에 제안하여 발주처으로 하여금 협의, 승인할 수 있도록 제안절차를 수행하여야 하며, 그 과정은 다음 각 호와 같다.

가) 설계의 경제성 등 검토 제안서 작성

나) 설계의 경제성 등 검토 제안서 제출 및 보고

다) 설계의 경제성 등 검토 제안서 수정 및 협의

3) 설계VE 수행자는 설계의 경제성등 검토 보고서의 제출과 함께 제안하는 내용을 좀더 효과적으로 전달하고 이해시키기 위해 발주처와 협의회, 보고회 또는 회의 등을 실시 할 수 있다.

4) 설계VE 수행절차 상의 Job Plan에 의한 세부내용과 기법의 활용실적이 포함된 「설계VE 보고서」충실히 작성하여야 한다.

5) 설계VE 수행자는 채택된 설계의 경제성등 검토업무 실적보고서 1부를 설계자에게 송부, 설계에 반영토록 한다.

나. 검토조직

1) 설계의 경제성 등 검토조직은 발주청의 담당자, 검토 조직의 책임자(VE leader), 검토조직의 팀원(VE 팀원)으로 구성한다.

2) 검토조직을 발주청 소속 직원으로만 구성하는 경우에는 검토조직에 외부전문가 1인 이상이 포함되어야 한다.

다. 제공자료(설계자 및 발주자가 제시하여야 할 자료)

1) 설계도(설계도 작성이 안 된 경우 스케치로 대체)

2) 지형도 및 지질자료

3) 주요 설계기준

4) 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서 및 설계업무 지침서

5) 사업내역서, 공사비산출서

6) 관련법규 등에 기초한 협의 및 허가수속 등의 진행상황

7) 기타 설계의 경제성 검토조직이 필요하다고 인정하여 요구하는 자료

라. 검토업무 절차 및 내용

1) 설계의 경제성 등 검토업무는 준비단계(Pre-Study), 분석단계(VE Study), 실행단계(Post-Study)로 나누어 실시한다.

2) 준비단계에서는 설계의 경제성 등 검토 조직의 편성, 설계의 경제성등 검토대상 선정, 설계의 경제성 등 검토 기간 결정, 관련 자료의 수집 등을 하여야 한다.

3) 분석단계에서는 선정한 대상의 정보수집, 아이디어의 창출, 아이디어의 평가, 대안의 구체화, 제안서의 작성 및 발표를 하여야 한다.

가) 분석단계에서 해당 사업의 설계자로부터 대안에 대한 의견을 듣는 것을 원칙으로 한다.

나) 대안의 구체화 및 제안서 작성은 안전성, 내구성 및 기능을 손상하지 않는 범위 내에서 가능한 한 유지관리비 등을 포함시킨 생애주기비용의 관점에서 행한다. 단, 생애주기비용의 관점에서 설계의 경제성등 검토가 불가능한 경우에는 시설물 완성단계까지의 건설사업비용의 관점에서 행한다.

다) 당해 사업의 비용배분 및 기능분석을 명확히 할 수 있는 자료를 작성하여야 한다.

라) 분석단계는 발주청, 설계자와 검토조직이 한 장소에 모여 워크숍 형태로 수행되어야 한다.

4) 실행단계에서 설계의 경제성등 검토 조직은 설계의 경제성등 검토에 따른 비용절감액과 검토과정에서 도출된 모든 관련 자료를 발주청에 제출하여야 하며, 발주청은 제안이 기술적으로 곤란하거나 비용을 증가시키는 등 특별한 사유가 없는 한 설계에 반영하여야 한다.

마. 제안 내용

설계의 경제성등 검토조직은 <별지 제2호 서식>의 설계의 경제성등 검토 제안서와 <별지 제3호 서식>의 생애주기비용 절감․가치향상 제안서 및 다음 각 호의 내용을 포함한 서류를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

1) 당초 설계와 제안된 설계와의 차이 설명, 각각의 장·단점, 기능이 변경된 경우 그 타당성, 변경에 의한 시설물의 성능에 미치는 영향 및 이와 관련된 객관적인 자료

2) 제안이 채택된 경우에 변경된 설계기준 또는 시방서의 목록

3) 발주청이 제안을 채택하여 실시하는 경우 각각의 제안사항이 건설사업비에 미치는 분석자료

4) 수정설계 비용, 시험 및 심사비용 등 제안을 채택할 경우 발주청이 부담할 가능성이 있는 비용의 설명 및 견적

5) 제안된 변경사항이 생애주기비용에 미치는 영향에 대한 예측

6) 제안사항이 설계 또는 시공에 미치는 영향

7) 기타 제안의 우수성을 판단하는데 필요한 자료

4. 세부수행업무

가. 설계VE 검토조직의 대표자는 계약 후 7일 이내에 착수보고서 및 검토조직인원 투입계획서, 설계검토업무 수행계획서를 발주기관에 제출하여야 한다.

나. 본 설계VE 검토를 수행함에 있어서 기본 및 실시설계용역 과업내용서 및 관련 자료를 완전히 숙지하여야 하며, 창의력을 발휘하여 공사비절감을 기하도록 노력하여야 한다.

다. 팀원은 과업내용서 및 기타 관련 법령에 준하여 설계도서 검토, 점검 등 설계를 검토하여야 한다.

라. 설계VE 검토조직은 검토된 설계도서의 검토사항은 수정, 보완되도록 설계용역 업체에서 통보하고 수정. 보완되었는지 확인해야 한다.

마. 실시설계 보고서를 사전에 제출받아 보고서 내용을 검토하여 내용의 오류 및 과업내용서에서 제시된 사항의 누락 여부 등을 종합적으로 검토하여 보고하여야 한다.

5. 설계검토 용역관련 행정처리

설계VE 검토조직의 대표자는 계약 후 7일 이내에 다음 사항을 포함한 착수 신고서<별지 제1호 서식>를 발주기관에 제출하여야 한다..

가. 수행계획서

- 설계검토대상 : 공사명, 설계검토규모, 설계검토기간 등

- 검토조직구성 : 조직 및 담당원의 분야별 배치계획서(선임계 :【붙임 2-2】)

- 검 토 계 획 : 책임자, 팀원으로 구분 배치하여 분야별 검토업무 지정.

- 보 안 각 서(참여자 전원서명) : 1부【붙임 1-1】

- 예정공정표 : 1부

※ 예정공정표에는 구체적인 과업추진 일정, 참여 인원별 업무수행 내용을 함께 제출하고, 대표자가 서명, 날인하여야 한다.

나. 준공(납품)검사는 발주기관에서 실시한다.

다. 준공검사는 준공부분에 대한 각종 검토결과 비치서류와 검토용역성과품 기타 필요한 서류를 첨부하여야 한다.

라. 설계결과 수정

모든 검토된 문서는 코멘트에 대한 조치를 위해 설계 책임수행자에게 보내지고 그들은 체크된 문서를 검토하고, 검토사항들에 대한 해결책을 확인하여야 한다.

6. 업무보고 및 회의

가. 본 용역 수행자는 발주기관 필요에 따라 수시보고를 하여야 하며, 발주기관이 지정한 장소에서 각종 보고회를 개최하여야 한다.

나. 주간공정보고 : 매주 목요일 2시까지 붙임 양식에 따라 건설팀 사업담당감독관들에게 전자우편으로 제출한다.【붙임 5】

7. 성과품 납품

가. 성과품 납품은 다음 수량을 원칙으로 하되 필요시 증․감할 수 있다.

- 최종보고서(A4복사지) 3부, CD 2매

나. 설계VE 조직 책임자는 업무를 수행하는 동안 다음 서류를 작성, 서명 날인하여 사무실에 비치, 운영하여 발주처의 담당자 요구가 있으면 언제든지 열람 확인할 수 있도록 하여야 하며, 본 용역 완료시 발주처에게 제출하여야 한다.

- 관련 회의록, 기타 발주처의 담당자가 필요하다고 인정하는 서류

8. 기타 과업수행시 참고사항

가. 본 과업수행 기간 중 VE용역 업무와 관련된 자문, 협의 등에 소요되는 제반경비(타 기관과의 협의로 인해 소요되는 제반 경비 포함)는 VE용역 수행자(계약상대자)가 부담한다.

나. 발주기관은 도급자의 자체능력으로 본 과업수행이 불가능하거나 본 과업이 목적한대로 원활한 업무 수행이 어렵다고 판단되는 경우 연대보증인에게 본 과업을 승계토록 조치할 수 있다.

다. 본 과업수행중 업무수행자의 무단교체 또는 부실 검토시에는 관계법규에 의하여 제재조치를 할 수 있다.

라. 부득이한 사유로 설계용역이 중지되었을 경우와 검토대상 구조물의 실시설계를 진행치 못할 경우 발주기관은 설계검토 업무를 일시 중지할 수 있다.

마. 본 과업내용서 및 기타사항에 대하여 발주기관과 의견을 달리하는 경우 사전협의하여 진행토록 한다.

바. 본 과업내용서에 규정하지 않은 사항들에 대해서는 발주기관과의 협의에 따라 업무를 조정할 수 있다.

6. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.
(착수계 제출 시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

7. 민원발생 방지대책 수립

가. 신축예정 부지 주변 건물에 일조권, 조망권, 하천 환경훼손 등 피해가 없도록 관련법규를 준수하여 설계하여야 한다.

나. 민원발생을 최소화 할 수 있는(소음, 먼지, 기타환경) 민원발생 방지 조치를 설계에 반영하여야 한다.

다. 공사차량 진출입으로 인한 부지 주변 교통영향 최소화 방안을 마련하여 설계에 반영하여야 한다.

라. 보행자의 안전사고 방지를 위해 가설펜스 등 일반인 출입관리에 대한 대책을 마련하여 설계에 반영하여야 한다.

마. 공사폐기물로 인하여 주변 대지 및 도로변이 오염되지 않도록 환경대책을 설계에 반영하여야 한다.

- 환경부 ‘날림먼지 관리 매뉴얼’ 참조하여 구체적인 저감방안 반영

8. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

가. 수급인은 설계공모 심사시 심사위원의 지적사항이 설계에 반영될 수 있도록 한다.

나. 설계공모 심사위원 지적사항에 대해 설계단계별(계획, 중간, 실시)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 시에 보고한다.

다. 계획, 중간, 실시설계단계에 설계도서 납품 시에 조치결과 보고서를 필히 첨부한다.

9. 기존 건축물(마프터플랜 포함) 및 기반 인프라 도면 제공

가. 발주처는 수급인에게 인프라 도면(공동구, 상하수도, 전력, 열원, 도시가스, 폐수, 오수, 우수 관로 등)을 제공한다.

나. 발주처는 수급인에게 캠퍼스 전체 활용을 고려한 합리적인 계획안이 도출될 수 있도록 캠퍼스 마스터플랜 자료를 제공한다.

제3장  과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업은 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술진흥법, 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 해당 지자체의 조례, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진에 관한 법률, 녹색건축물조성지원법, 환경영향 평가법, 도시교통 촉진법, 대기환경 보전법, 수도법, 하수도법, 도시가스 사업법, 고압가스 안전관리법, 에너지 절약 설계기준, 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 등 당해 사업 관련된 법령과 각종 고시, 지침 등의 위배가 없어야 한다.

나. 본 과업은 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시)에 의거 수행하여야 한다.

다. 상기 기준의 24조(설계도서 작성기준)는 건설공사의 설계도서 작성기준에 의거하여 작성한다.

라. 본 과업은「건축구조기준」에 따라 내진설계를 수행한다.

1) 지진하중 산정 시 2400년 재현주기지진의 유효지반가속도 S값은「건축구조기준」<표 0306.3.1>을 이용하여 결정한 S값의 100%보다 작아서는 안 된다.

2) 건축물의 내진등급과 중요도계수는 「건축구조기준」<표 0306.4.1>  내진등급(Ⅰ)과 중요도계수(1.2)를 적용한다.

마. 수급인은 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

바. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 계약상대자는 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 한다.

4) 제출된 성과품에 대한 모든 기술권 및 지적재산권은 본교에 귀속되므로 수급인은 차후 기술 및 용역권한 행사나 민사, 형사상의 소송을 제기할 수 없다.

5) 수급인은 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입해야하며 가입한 증서는 고시된 업무요령에 따라 용역 완료 전 제출해야한다.

가) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

나) (계약예규) 용역계약일반조건 제41조

다) 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제16조, 제16조의2, 제16조의3, 제16조의4

라) 엔지니어링산업진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

마) 건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

바) 건설엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무요령 (국토교통부 고시 제2023-288호)

사) 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

6) 대상 용역이 종합심사낙찰제(또는 간이종합심사낙찰제) 대상 공사일 경우 물량내역수정허용공종 선정 및 물량산출적정성 검토 등의 업무에 협조하여야 한다.

2. 설계 일반 지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서(검토용 도서 별도)로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 수급인은 기계설비, 통신설비(엔지니어링 통신분야 면허업체), 소방설비(소방법에 의한 면허업체)를 위임 또는 위탁 시 관계법에 규정된 적격업체를 선정하여 설계 착수 시 본교에 통보하여야 한다.

사. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안정성과 조형미를 살리면서 국가 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 주변현황을 고려하여 안정성 있고 기존건물과 조화롭게 설계하여야 한다.

4) 승강기는 직원 및 방문객 등을 고려하여 효율적인 위치 및 수량을 산정하며 효율적인 위치 및 수량을 설계에 반영하여야 한다.

5) EPS, TPS, MDF실을 별도로 구획하여 설계반영 하여야 한다.

6) 기계실, 공조실, 파이프 샤프트, AD를 별도로 구획하여야하며, 기계설비 설계기준을 준수하여 설계에 반영하여야 한다.

7) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선과 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

아. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 외관은 기존 건축물과 조화를 이루는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 발주처와 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

자. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

1) 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

2) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

차. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) “공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2024-110호)” 및 “건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시 제2024-1026호)” 등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

2) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하여야 한다.

4) 전기설비는 신재생에너지(신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 제12조 제2항)설비를 설계하여야 한다.

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도를 반영하여야 한다.

카. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

타. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

파. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 향후 증축대비 설계(수요기관과 사전 협의 필요)
향후 시설의 2개층 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, 외관 디자인, Expansion Joint 등)을 수립․반영하여야 한다.

하. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

6) 건축물의 요구 성능 만족을 위해 부득이하게 특정자재를 사용하게 될 경우에는 특정자재 사용목록을 [붙임7]의 양식에 따라 작성하여 승인을 받아야 한다. (특정자재 사용목록은 관급자재 선정검토서 제출 시에 별도 제출)

거. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 전기․정보통신, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 건설공사의 수량 및 견적업무

바) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 수급인은 하도급된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

3. 분야별 지침

가. 건축

1) 일반사항

가) 본원 내 주변 건물 및 환경과 어울리는 창의적 디자인을 설계한다.

나) 안전하고 편리한 보행동선 및 차량/화물/폐기물 진출입 동선을 계획한다.

다) 공기 단축과 공사비를 절감할 수 있는 새로운 검증된 공법과 첨단기술 등을 적극 도입하여 완벽한 설계가 되도록 한다.

라) 초기투자비와 운영비가 저렴한 에너지 절약형의 설계를 하여야 한다.

마) 이용자의 편의성제고 및 효율적 이용을 위하여 창업·실험·연구·편의 기능이 적절하게 집·분산 배치 및 구성되도록 하며, 각 기능의 독립성은 보호하되 상호공간간의 연계성을 극대화 하고, 접근성 및 개방성을 확보하는 설계방안을 제시

바) 건물에 사용되는 자재는 KS제품을 원칙으로 하되, 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계를 한다.

사) 건물의 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

아) 지진과 태풍으로부터 인명과 건축물을 안전하게 보호할 수 있도록 건축물의 내진 및 내풍 설계를 하여야 한다.

자) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

(방음시설이 필요한 실은 진동 및 음의 전달을 방지토록 설계)

차) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리 및 증축을 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 실 크기과 동선을 확보하여야 한다.

타) 주차계획은 교통영향평가에 요구하는 주차대수 이상으로 최대한 확보하고 장애인용 주차장의 충분한 설치와 이용에 불편함이 없도록 설계하여야 하며,  지하주차장 진출입구는 캠퍼스내 교통환경을 고려하여 효율적이고 합리적인 동선을 구획한다.

2) 평면계획

가) 조닝을 통해 독립된 층 또는 실별로 입주할 수 있도록 계획하고, 기능적인 부분은 서로 연계되도록 설계한다.

나) 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립이 되면서도 각각 실별 기능이 상호 유기적 관계가 되도록 고려한다.

다) 각 실별 용도와 기능에 적합한 공간을 계획하여야 하며, 사용자의 편의성을 최대한 반영하여 쾌적함을 줄 수 있도록 한다.

라) 관련법규 요건에 속하는 실은 그 기준에 따라 적법하게 설치하고 실별로 기능적인 부분은 서로 연계되도록 설계한다.

마) 바닥 마감 재료선택은 발주처와 협의 후 설계에 반영한다.

3) 입면 및 단면계획

가) 내․외장재는 파손 또는 마모 등으로 인한 보수의 용이성과 청소 등의 유지관리부분에 경제성을 고려한다.

나) 실의 용도에 따라 마감 재료를 고려한다.

다) 주변 상황, 각 공간의 기능 및 면적, 건축물의 평면, 입면, 구조, 마감 및 건축설비, 헤파필터 교체 등 유지보수에 필요한 공간 등 등을 고려한 적정한 천정고를 산정하여 경제적이고 명쾌한 단면계획이 되도록 한다.

4) 구조계획

가) 적재하중 및 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며, 건축법 및 건축구조기준 (국토교통부 고시 제2024-846호, 2024.12.24.), 실내건축의 구조‧시공 방법등에 관한기준 (국토교통부 고시 제2020-742호, 2020.10.22.)등 관련 규정에 적합하게 설계하여야 한다.

나) 기능이 적절하며 경제적이고 안전한 구조로 계획한다.

다) 정확한 기초설계와 내진설계 필히 반영한다.

라) 지질조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

마) 주요 구조부위 치수를 모듈화하고 건물 마감을 고려하여 설계한다.

나. 토목

1) 일반사항

가) 현장의 자연적인 지형조건 검토, 부지, 옹벽 및 성토, 조형성과 경제성을 합리적으로 계획한다.

나) 설계에 임하기 전에 설계자는 반드시 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 배수상황 등 제반 주변 사항을 조사하여 경계를 확정하고 조사 내용은 기본설계에 반영하여야 한다.

다) 적용공법은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 한다.

라) 준공 후 유지 및 관리에 편리한 경제적인 계획을 수립한다.

마) 본 설계는 다음사항을 충분히 검토한 후 설계에 반영한다.

• 공사 중 표면수 처리방안

• 지하 굴착 시 발생될 수 있는 지반변형 억제시설 및 차수시설

• 지하수 발  생시 지하수 처리 방안

• 공사 시행으로 인하여 주변건물 및 시설에 미치는 소음, 진동, 먼지, 수질 등의 환경에 관련된 민원요인 저감대책 수립 및 설계

바) 각종 협의 및 인ㆍ허가 시 공사와 관련된 협의조건이 있다면 설계도서에 필히 반영 하여 차후 공사착공 및 준공에 문제가 없어야 한다.

사) 설계도서 작성 시 토목공사 표준시방서 등 아래의 정부 제정 각종시방서 및 시설기준, 규정, 지침 등을 준수하여 설계하여야 한다.

(1) 토목공사 일반 표준시방서(국토교통부)

(2) 콘크리트 표준시방서(국토교통부)

(3) 도로공사 표준시방서(국토교통부)

(4) 콘크리트 구조설계기준(국토교통부)

(5) 건설공사 품질시험기준(국토교통부)

(6) 상하수도 시설기준(국토교통부)

(7) 도로의 구조, 시설기준에 관한 규정(국토교통부)

(8) 건설기술 관리법령 및 시행규칙(국토교통부)

(9) 도시계획시설 기준(국토교통부)

(10) 건설공사 관계법령 및 규정(국토교통부)

(11) 산업안전보건법(국토교통부)

(12) 한국공업규격(국립기술품질원)

2) 구내 우․오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위 내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

바) 오수처리계획은 기존 교내 오수맨홀에 연결함을 원칙으로 한다.

사) 오수관로계획은 대학 실정에 맞도록 계획하고 가능한 자연배수가 되도록 계획하여야 한다.

3) 도로 및 포장 설계

가) 도로계획은 이용자의 편의를 감안하여 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고 보행자의 안전을 고려하여 공사기간동안 구성원들의 불편을 야기하지 않도록 임시 우회도로를 계획하는 등 합리적으로 배치하여야 한다.

나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

다) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

라) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

4) 기타

가) 공사 부지 경계 부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

나) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를

하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

다) 일반적인 부지 내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

라) 사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영하고 필요시 토량이동계획도를 작성한다.

마) 각종 시설물은 경제적이고 친환경적으로 설계한다.

다. 조경

1) 일반사항

가) 부지의 특성과 토양 및 주변 수종 등을 감안하여 설계에 반영하여야 하며 조경은 상호 이질감이 없도록 건물의 성격에 조화되도록 한다.

나) 보도, 차도의 성격을 구분하여 중복이 없도록 효율적인 체계를 확립한다.

다) 오염에 강하고 계절감이 있는 수목 구성으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

라) 병충해, 전정, 동절기 보온 등 유지관리가 용이한 수목을 선정한다.

마) 조경 관련 시설물 등에 대하여는 위치, 규모, 재료, 수량, 내구성, 질감, 구조 등을 충분히 고려하여 DESIGN하고 이용자의 휴식 등을 위한 인공구조물을 설치하되 주변지형, 단지내 지형, 시설물 등과 조화를 이루도록 한다.

바) 기존 수목 이식 여부를 조사하고 발주처와 협의하여 설계에 반영한다.

2) 조경수목

가) 조경수는 해당 지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않은 경우에는 조경수 식재구역의 토사를 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

다) 단지 내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

라) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수 간의 충분한 이격거리를 확보하여야 한다.

마) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

3) 조경시설물

가) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

나) 조경 포장이 있는 경우에는 환경친화적인 재료로 기존시설 및 자재와 융합이 이루어지도록 사용하여야 한다.

다) 필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내 조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 구조안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

라. 기계설비

1) 일반사항

가) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고 기타 발생 열량은 건축, 전기, 기타 조건에 적합하게 설계한다.

나) 수급인은 발주처로부터 받은 각종 인프라도면을 참고하여 기본조사(급수, 가스, 오폐수 처리시설, 지하수 등)를 하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 수급인은 발주처로부터 받은 각종 인프라도면을 참고하여 SPF공조 설비, 냉ㆍ난방설비, 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며 주요장비는 설계 전 반드시 발주자의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

라) 설계기준

- 공기조화 냉동공학회 편람, 건축설비핸드북 등 이와 동등 이상의 신빙성이 있는 자료를 적용

- 환기부하: 각 실의 특성을 고려하여 환기량을 산정

- 재실인원: 발주처와 협의

- 인체 발생열량: 동양인 기준 및 온도에 따른 보정값 적용

- 일사 취득열량, 상당외기 온도차 등 기타기준은「ASHRAE」를 적용(열전도율, 관류율은 국내 및 번역 문헌 적용)

마) 공공기관 에너지합리화 추진에 관한 규정 제11조에 의거 고효율에너지 기자재를 사용하여야 한다.

2) 기계설비별 내용

가) 냉·난방 설비

- 급․배기 등은 에너지절약 환기시설을 계획 보고하여야 한다.

- 학교여건, 경제성, 유리관리 등을 충분히 고려하여 실 용도별, 사용시간대별로 가장 효과적인 냉ㆍ난방방식을 선정토록 비고 검토하여 발주자 승인 후 설계를 진행한다.

- 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 하며, 조달청우수제품, 신기술, 고효율, 친환경인증제품을 적극 검토 반영하여야 한다.

- 조닝별 제어방식을 검토하여야 한다.

- 실내의 공조 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.

- 건축물에 관련된 기계설비 인프라에 대하여 사전조사를 하여 설계 반영하여야 한다.

- 기계설비 장비하중을 고려한 건축 구조가 되도록 건축설계에 반영 하여야 한다.

- 환기시스템은 「실내공기질관리법」의 다중이용시설의 실내공기질  유지기준에 준하여 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창으로 확보하고 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하여 에너지 손실이 적은 시스템을 계획한다.

나) 위생설비

- 급수, 급탕방식은 효율적이고, 안정적인 공급 계획을 수립 후 발주처와 협의하여 결정한다.

- 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야한다.

- 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 방지대책을 수립하여야 한다.

- 위생기구는 KS 제품 또는 동등 이상 제품을 사용하고 절수기구로 계획한다.

다) 기계소방설비

- 소방관련 제반 법규에 적합하고 대략적인 용량 및 규모에 대한 검토와 방재설비(전기, 통신)와 관련된 소화설비, 소방법상 방화구역 적용시 문제점, 배연시설 등을 종합적으로 검토 계획한다.

- 소화설비의 적용범위기준에 따른 기기 적정용량, 댓수, 형식 등 누락없이 설계한다. (소화기구, 옥내외 소화전, 스프링클러, 소화용수설비, 연결송수관,  배연설비, 피난기구)

- 건물 내 층별, 구역별 방화구획에 따른 방화구조물 및 방화댐퍼 등을 관련 법령에 적합하게 설계한다.

라) 자동제어

- 본 건물 규모에 적합한 것으로 기능이 우수하고, 온․습도 조절 및 주요 제어대상에 대하여 중앙감시실에서 기기를 제어할 수 있도록 계획한다.

- 자동제어시스템은 기존 시스템과 호환이 가능하고, 유지보수가 용이한 기자재 및 시스템을 적용한다.

- 각 그룹별 제어방식과 조닝에 대한 제어방식을 검토ㆍ설계한다.

마) 기타 관련법규 및 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 하며 세부설계지침은 발주자와 협의한다.

마. 정보통신

1) 공통사항

가) 사전조사를 충분히 하여 시설 및 인원 증가 등의 수요를 감안한 미래지향적이고 확장성이 보장된 계획을 하여야 한다.

나) 설치와 유지관리 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다) 설계 시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대비하여 계획하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계 한다.

라) 원활한 공사와 통신소통을 위하여 경제․기술․환경적인 조건을 사전 검토하여 통신실의 위치 이동 여부를 결정하여야 한다.

마) OA기기, 집무형태 변화, 방(Room) 용도 변경 등의 모든 상황에 대응하는 Flexibility 한 System을 구성한다.

바) 정보통신시설은 첨단 설비로 설계에 반영하고 접지시스템을 검토한다.

사) 통신설비들의 설계는 TTA표준, KICI설계기준(한국정보통신산업연구원) 등을 준용한다.

2) 통신실 및 간선 공사

가) 유선통신 기계실과 유무선 LAN실을 분리하여 계획한다.

나) HEADEND 설치공간을 확보할 수 있도록 계획 한다.

다) 통신선로 효율적 관리를 위하여 PS EPS 등과 분리하여 TPS를 따로 계획 한다.

라) 전화 LAN TV 방송 등 학내 통신시스템의 장래 증가에 대비하여 회선 인입루트 및 공간 재배치 계획을 수립한다.

마) MDF/IDF 위치 규모를 발주처와 협의 후 계획한다.

바) 통신기계실 바닥은 악세스플로어를 설치하며 통신장비의 운영 상황을 고려하여 계획을 수립한다.

3) 배관 배선공사

가) 학교의 기존 설비와 같은 배선시스템을 계획한다.

나) 전화/LAN 수구는 미래 수요를 감안하여 충분한 공간과 회선․용량을 확보한다.

다) 확장과 유지보수가 용이하도록 배관 계획을 한다.

4) 전화 설비

가) 전화설비는 학내 기존 통신설비와 연계하여 계획한다.

나) 전화는 미래를 위하여 DID Voip 전화가 가능하도록 계획한다.

다) 배선은 UTP cat.6 이상으로 계획한다.

5) LAN 설비

가) 유선 전송속도는 Gbps로 배선은 Star방식으로 하며 기존 시스템과 연계한 방식을 계획한다.

나) 건물 내에서는 유․무선 통신이 가능하고 외부에서는 모바일 기기 사용을 위한 무선 인터넷이 가능하도록 네트워크망을 계획한다.

다) 배선은 UTP cat.6A 이상으로 계획한다.

라) 전자교탁에서도 사용될 수 있도록 한다.

마) LAN, 통합배선설비, 구내통신선로 등을 구성하는 케이블들의 구조와 전송특성은 TTA표준(TTAK.KO-04.0002/R2, TTAK.KO-01.0216)을 만족하도록 설계한다.

6) 방송 설비

가) 전관방송은 옥내와 외부로 구분하여 구성하고 일반 안내방송 및 소방법에 적합한 방송설비를 계획한다.

나) 화재에 의하여 자동으로 경보방송을 할 수 있도록 계획한다.

다) 학교 방송국의 송출 방송을 옥외 스피커에 방송할 수 있도록 계획한다.

라) 지진가속기 신호를 자동으로 경보 방송할 수 있도록 계획한다.

7) CATV 및 방범 설비

가) 교내 전 지역에 방송이 원활하게 수신되도록 HEADEND 설비를 보완 계획한다.

나) 설치 장소는 학교의 지침을 받아 말단까지 수신이 원활하게 되도록 계획한다.

다) 기존 방범 설비와 연계된 CCTV 및 방범 설비를 계획한다.

8) 접지공사

가) 통신접지 시스템은 IEC규격에 적합하도록 계획한다.

나) 기존 통신실 및 IDF의 접지를 검토 보완하도록 한다.

9) 부재 표시등 시스템 점검 후 보완 계획한다.

10) 기타 언급되지 않은 통신 설비도 누락된 사항이 있으면 구체적 검토 후 설계에 반영한다.

11) 법령을 준수하여 설계하여야 한다.

가) 전기통신 관련법

나) 전기 관련법

다) 건축 관련법

라) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

마) 건축물의 에너지절약 설계 기준

바) 공공기관 에너지이용합리화 추진규정

사) 소방 관련법

12) 각종 통신설비들의 정보 등은 대·개체, 신·증설 등에 따라 상시 현행으로 관리되도록 하고,  해킹이나 장애 지점 등은 실시간으로 감시되도록  계획한다.

바. 철거 및 폐기물 처리계획

1) 신축공사에서 필연적으로 발생하는 철거공사에서‘폐기물관리법’상의 폐기물과‘건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법’상의 건설폐기물의 발생이 최소화 하도록 하기 위하여‘친환경 철거공사 설계방안’을 수립하여 제시하여야 한다.

2)‘친환경 철거공사 설계방안’의 내용에는 발생 예상되는 건설폐기물의 종류를 성상별로 분류하고 각각의 예상발생량을 산출하여 제시하며, 석면의 유해물질 등이 있을 경우 보다 안전한 공사를 진행할 수 있도록 석면해체 및 제거작업 계획을 반영하여야 한다.

4. 설계진행 시 유의사항

가. 수급인은 신․재생에너지 사용방안을 검토하여 비용이 절감되는 안을 제출하여 발주처와 협의하여야 하며 에너지사용계획서를 작성하여 한국에너지공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.

나. 지반조사 공수는 NX 2공이며, 사전에 위치 선정 등 지반조사 지반조사 계획서를 발주기관 담당자에게 제출하여 승인 후 지반조사를 시행한다. (지반조사 후 결과보고서 제출)

다. 발주기관 사무실(감독관실 등)에 필요한 집기류 등의 임대비용은 사업의 규모/기간별로 적정금액을 내역에 별도 반영하여야 한다.

라. 수급인은 인테리어 설계가 필요한 아래 실에서는 인테리어 설계에 대한 계획/중간/실시설계 단계별로 보고회를 개최하고 발주기관의 승인을 받아야 한다.

- 인테리어 설계가 필요한 실 : 추후 발주기관과 협의하여 시행

마. 수급인은 발주처로부터 받은 각종 인프라도면을 참고하여 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

- 공공시설물, 전기/통신/상․하수도/가스 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

바. 수급인은 발주처로부터 받은 각종 인프라도면을 참고하여 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

사. 수급인은 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

아. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 발주기관과 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

자. T.B.M(가수준점)을 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

차. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

카. 수급인은「건설현장 축중기 설치지침 (국토교통부 훈령 제1058호)」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

- 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

타. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지반조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지반조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지반조사, 분석하여야 한다.

파. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

하. 수급인은 본 사업의 전기분야 용역업체와 원활히 협업하여 설계하여야 한다.

5. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인

계약상대자는 설계관리 일정표에 따라 각 사업특성에 맞게 예정공정표를 작성하여 승인을 득하여야 하며, 예정공정표에는 단계별 심사일을 지정하고 각 단계별 제출도서를 제출 후 승인을 득하여야 한다.

6. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축폐기물처리도서는 분리발주가 가능토록 별도 작성(시방서 포함)하여야 한다.

7. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : T

8) 소방도면 : EF(전기소방), MF(기계소방)

8. 도면작성

가. 도면규격은 제5장 납품도서 목록을 참고한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

제4장 설계도서 작성요령

1. 일반사항

가. 본 용역에 참여하는 설계자들은 교육연구시설 및 일반연구소 건축계획 및 설계에 대한 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 설계가 되도록 한다.

나. 수급인은 본 용역업무를 원활히 수행하기 위해 각 항목별로 전문기술인력을 확보한 용역업체들과 협력관계를 체결하여 용역수행을 할 수 있다.

다. 수급인은 발주자가 내부 보고자료 제출 및 각종회의 참석 등을 요구할 경우에는 이에 응하여야 한다.

라. 본 용역 과업지시서에 명시되지 아니한 사항이라도 관계법령의 규정 등에 의하여 필요하다고 인정하는 중요사항은 발주자와 협의하여 결정한다.

마. 수급인은 본 과업수행에 있어서 관계부서 및 유관기관과 충분한 사전협의를 거쳐야 하고 협의사항 및 각종 조사, 협의결과를 보고서에 반영한다.

바. 수급인은 본 과업을 수행함에 있어서 과업내용별 각 항목에 대하여 자료분석, 현황파악, 사례조사, 대안제시, 결론도출 등을 통해 구체적인 검토 안을 제시한다.

2. 공통사항

가. ‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)’을 준수하여야 하며, 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

다. 설계도서(시방서)에 다음의 내용을 명시하여야 한다.

「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」의 [별표13] ‘내진능력 산정 기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개하여야 한다.

라. 설계자가 작성․제출하는 시방서 안내

① 설계자가 작성․제출하는 시방서는 조달청에서 ‘시방서 작성 간소화 및 내실화’ 목적으로 마련하여 제공하는 『설계자 작성용 공사시방서 방침』에 따라 작성한다.(붙임11, 12 참고)

② 작성방법은 표준시방서(국토부)에 명시된 내용은 코드번호(링크처리)로 대체하고, 중요․핵심사항과 주의사항 등은 제공 양식에 따라 설계자가 별도 작성․제출한다.

③ 시방서의 내용과 관련하여 공사관계자 간의 시공관리에 혼선이 우려되는 부분은 보다 상세하게 작성하여 시공 중 논란이 없도록 하여야 하며, 논란이 발생 시에는 설계자의 의견 제시 등 해결에 적극 협조하여야 한다.

※ 특기시방서는 임의 양식으로 작성 가능

3 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 수급인은 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 계획설계(안) 작성시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 측량성과도

9) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 발주기관에서 제공하는 캠퍼스 마스터플랜, 인접 건물 구조도, 부지 측량 및 지반 현황, 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설 자료를 실제 현장에 맞는지 일체의 사항을 조사한다.

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

마. 측량조사방법

1) 일반사항

가) 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

나) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독관과 협의 후 현지측량에 임해야 한다.

다) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

라) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

마) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

바) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산할 수 있다.

사) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

아) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

자) 지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

차) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10% 이상 여유있게 측량해야 한다.

2) 조사측량

가) 현황측량(평판측량)은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

- 축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 과업면적의 10% 이상 여유로 측량하여야 한다.

나) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주기관과 협의 후 결정한다.

다) 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

라) 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

마) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시하여야 한다.

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

바) 각종조사 및 계산

- 지적의 복제

◦ 기 조사된 지적도와 현황측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

- 계산

◦ 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의하여 실시한다.

3) 표시항목

- 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

4) 기타사항

가) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

나) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산한다.

다) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

라) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 발주기관의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

4. 중간설계

가. 정의

- “중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지반조사계획서에 근거한 지반조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

다. 지반(지반)조사

1) 일반사항

가) 지반조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, 공수)와 기존 조사내용을 첨부하여 작성 발주기관의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

나) 현장 시추 작업시 반드시 현장에 설계용역 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장 시추 일정을 발주기관에 보고하여 발주기관에서 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만, 발주기관의 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주기관에 보고하여야 한다.

다) 지반조사는 엔지니어링기술진흥법에 의한 지반 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행 하여야 한다.

라) 지반조사는 발주기관이 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 발주기관의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

마) 수급인은 현장 지반조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주기관의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

바) 지반조사 시 책임기술자를 상주하여 지반조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

사) 지반조사업체는 토질지반정수를 산정하여 건축구조(기초), 토목설계 업무 담당자와 공유하여 적정 토질지반정수가 설계에 반영되도록 하여야한다.

2) 지반조사 방법

가) 지반조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지반조사를 실시함을 원칙으로 한다.

나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지반상태의 변화가 심하고 공사기간중 장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 감독관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

다) 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 연암 2.0m이상까지 실시하여야 한다.

라) 수급인은 현장 지반조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시하여야 한다.

마) 수급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

바) 수급인은 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 관련규정 및 발주기관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

사) 지하질의 분포상태, 연약층의 유․무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공한다.

아) 시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 검토 및 지정하여 실시토록 하고 토층여건과 토층변화에 따라 (변화가 심할 때 등) 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

자) 토질조사 보오링 시추 및 표준관입 시험을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 작성 제출하여야 한다.

차) 본 조사설계의 토층, 심도, 원위치 시험, 실내시험 등은 추정한 것인바, 조사결과에 따라 설계에 맞추어 정산한다. 단 증가된 사항은 인정하지 않는다.

카) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

- 조 사 명

- 조사기간

- 조사위치

- 조 사 자

- 시 행 자

- 시추번호

- 시추장비명

- 각 채취시료의 위치 및 심도

- 시추중에 나타난 층의 관찰

- 지하수위 : 시추 완료후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

- 코아회수율 및 천공속도

- 앞층 천공압력 및 비트 회전속도

- 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

- 시추중에 판단하는 토층 및 암층분류

- 토층 및 암층의 심볼위치

타) 수급자는 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합분석하여 공사비 산출 및 기초구조가 경제적이고 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성하여야 한다.

파) 수급자는 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

- 조 사 명

- 조사시행자명

- 조사요약 보고문 : 수급자 대표 및 기술자의 인명날인

- 조사개요

- 조사세부내용 및 기타

◦ 지층분포상태 및 지층의 특성

◦ 지하수위 분포

◦ 표준관입시험 결과

◦ 각종 시험성과 및 분석 자료

◦ 지반정수 산정자료 및 기초지반의 지지력

◦ 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지반도, 위치도, 기타 필요 자료

◦ 기초형태에 대한 제안

하) 지반조사 보고서는 별도로 제출한다.

3) 지반조사시험

가) 자연시료채취

- 연약 점토층에서의 자연시료 채취는 KSF2317에 규정한 시험방법에 의거 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 밀봉하고 시료상자에  보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

나) 지하수위측정

- 시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

- 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동상태를 파악한다.

다) 표준관입시험

- 표준관입시험은 KSF2307 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

- 시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

라) 시험의 종류

- 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석시험 등

마) 토질시험

- 표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KSF 규정에 의거하여 실시한다.

바) 암석시험

- 채취된 암석코어 시료에 대한 시험은 공인규정에 의거하여 실시한다.

사) 하향식 탄성파탐사시험(다운홀 테스트)

- 지반의 탄성파 속도(종파 및 횡파)와 밀도 측정을 기초로 지반의 동적특성(동전단계수, 동탄성계수, 체적계수)를 파악하여 내진설계에 활용

아) 기타시험

- 토질 및 암석시험은 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다.

자) 시료상자 정리

- 시료상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고  상자 내에서 토사나 암석코아를 채취심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며,  암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

- 암석코아가 아닌 슬라임만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은  요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

차) 사진촬영

- 조사 전․후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전  과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

4) 기타 유의사항

가) 계약상대자는 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

나) 보링주상도에 사용하는 심볼(symbol) 등 각종 표시 및 기호는 표준기호를 사용한다.

다) 계약상대자는 현장조사 및 실내시험이 완료되면 성과를 종합 분석한 보고서를 제시하여야 한다.

라) 계약상대자는 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 하며 책임기술자가 인명 날인하여야 한다.

- 조사명, 조사 시행자명, 조사개요, 조사 세부내용, 조사 성과분석, 제 시험 성과표, 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지반도, 위치도, 기타 필요 자료

라. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출 표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서 (옹벽, 가시설)

- 수리계산서

- 절(터파기)⋅성토 사면안정성검토서

다) 지반조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지반조사 방법에 따른 성과물

라) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

마) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

5. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

- 당해 공사의 시방서에는 건축물의 내진능력*을 산정하여 준공표지판에 공개**하도록 필히 기술

* 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력

** 내진능력은 수정 메르칼리 진도 등급(MMI 등급)과 최대지반가속도를 함께 표기(예시 : Ⅶ-0.150g)

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내부면적 용도별/실별/전용/공용 면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 지반조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지반, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

6) 소방

가) 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 제연설비풍량계산서, 소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	4	부	계략적조감도 및 스터디 모형 포함
2	현장조사보고서	A4	4	부	유사시설견학보고서 포함
3	현황측량보고서		4	부	현황측량성과도
4	관련법규 검토서	A4	4	부
5	공사비 검토서	A4	4	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 설계공모 심사위원의 지적사항 / 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 CD로도 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공사비
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전문, 관급시방포함
6	지반조사보고서	A4	5	부		◯
7	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	3	부
8	건축물 에너지효율인증 관련 검토서	A4	3	부

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	원도	A1	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	발주기관 요구시
4	설계도면	A1	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
	설계도면	A3	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	관급내역서 포함 (별도 제본)
7	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	공사시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	관급시방서 포함
11	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	조감도		3	부	◯
13	공정표		2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
14	DVD(CD)		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	계획/중간/실시/각종심의/ 인허가관련문서/회의록/ 각종발표자료 등 포함
15	녹색건축, 건축물 에너지효율, 제로에너지 건물 예비인증서
16	에너지 절약계획서 관련 증빙서류
17	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등										공사개요, 현장설명서 포함
18	자재 견본 자료	A4	2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	제품명, 색상, 규격 등 포함 (발주처 협의)
19	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	설계의 안정성 검토서(해당시) 등

1 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5매와 원본File을 CD로 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

4) 녹색건축 및 건축물에너지효율 예비인증서, 제로에너지건축물 예비인증서는 발주처의 특별한 사유가 있는 경우 협의 시점까지 해당 인증기관 접수증 등으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 설계용역비 중 일부(인증관련 업무대가 또는 합의금)의 지급을 유보할 수 있음.

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다.

출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

* 국토교통부훈령 제1140호  ‘공공 건설공사의 공사기간 산정기준’에 근거하여 공사기간 산정

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

1) 공사개요서는 수요기관의 총공사비 예산 및 당해연도 공사비예산(장기계속계약)을 구분하여 작성하되, 건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물, 기타 예산을 예정공정표를 근거로 금차공사기간 및 금차공사금액을 추정 산출하여야 한다.

2) 현장설명서는 조달청 홈페이지에 게재된 기본양식을 기준으로 작성하되, 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 작성하여야 하며, 관급자재 선정내용 등을 정확히 기재하여야 한다.

마. 조감도(A1 이상으로 규격은 사전에 협의하여 결정, 표구 포함) 3부

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

사. 기타 발주자가 요구하는 성과품.  끝.

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 202 .   .   .

3. 착수  일자 : 202 .   .   .

4. 완수예정일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 국가계약법 시행령 제14조 제2항 내지 제3항에 해당하는 입찰관련서류의 열람 또는 교부를 위하여 발주기관이 전자조달시스템에 설계용역계약의 계약목적물인 설계서를 게재할 수 있다는 데에 동의한다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202 년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

한국과학기술원 총장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

한국과학기술원 총장 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지반조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

4. 보안각서 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

한국과학기술원 총장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일		승인요청 (통보)일
착수일자		완수일자
수 급 인		하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류	관계규정	하도급 신청내용	검토결과	비고
계약서	- 하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2(표준하도급계약서의 작성 및 사용)
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건	- 기술사법 제3조(기술사무의 직무) - 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) - 엔지니어링산업 진흥법 제2조(정의) - 엔지니어링산업 진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) - 소방시설공사업법 시행령 제2조(소방시설업의 등록기준 및 영업범위)
책임기술자 기술자격 및 경력증명서	- 건설기술 진흥법 제21조(건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서	- 건설기술 진흥법 제21조(건설기술자의 신고) - 소방시설공사업법 시행령 제2조 [별표1]소방시설업의 업종별 등록기준 및 영업범위
하도급 금액 및 비율
하도급 사유	- 건축법 제67조(관계전문기술자) - 건축법 시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력) - 건축법 시행규칙 제36조의2(관계전문기술자) - 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제5조(하도급 승인)

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

한국과학기술원 총장 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(202 . . .)	금주예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

202 .  .  .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :                          (인)

한국과학기술원 총장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분		월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주	분야		(실시/예정공정)
	분야
둘째주	분야
	분야
셋째주	분야
	분야
넷째주	분야
	분야
다섯째주	분야
	분야
익월		- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

202 .  .  .

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

한국과학기술원 총장 귀하

〔붙임 7〕 특정자재사용리스트

특정자재 사용 목록

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   사업책임기술자  ○ ○ ○ 서명

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외

[붙임 8] Space program

층별	실명	세부용도	단위면적(㎡)	실수	면적(㎡)	비고
지상 7층 (화학)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5
	연구실	교수연구실	21.5	3	64.5
	연구실	학생연구실	-	-	-
	실험실	실험실(학생연구실 포함, 추후 분리)	130.0	3	390.0	(Wet Lab)
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	309.0	-	309.0
	소계				785.0
지상 6층 (화학)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5
	연구실	교수연구실	21.5	3	64.5
	연구실	학생연구실	-	-	-
	실험실	실험실(학생연구실 포함, 추후 분리)	130.0	3	390.0	(Wet Lab)
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	309.0	-	309.0
	소계				785.0
지상 5층 (물리)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5
	연구실	교수연구실	21.5	3	64.5
	연구실	학생연구실	-	-	-
	실험실	실험실(학생연구실 포함, 추후 분리)	130.0	3	390.0	(Wet Lab)
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	309.0	-	309.0
	소계				785.0
지상 4층 (물리)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5
	연구실	교수연구실	21.5	3	64.5
	연구실	학생연구실	-	-	-
	실험실	실험실(학생연구실 포함, 추후 분리)	130.0	3	390.0	(Wet Lab)
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	309.0	-	309.0
	소계				785.0
지상 3층 (양자)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5
	연구실	교수연구실	21.5	3	64.5
	연구실	학생연구실	-	-	-
	실험실	실험실(학생연구실 포함, 추후 분리)	130.0	3	390.0	(Wet Lab)
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	309.0	-	309.0
	소계				785.0
지상 2층 (수리)	세미나실	회의 및 강의	21.5	2	43.0	세미나실 사이에 가변형 칸막이 설치
	행정지원실	행정지원실	21.5	1	21.5
	연구실	교수연구실(방문자 연구실 1개 포함)	21.5	7	150.5
	연구실	학생연구실(포닥연구실 1개 포함)	43.0	6	258.0	Wet Lab 전환 고려
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	312.0	-	312.0
	소계				785.0
지상 1층 (교무처)	세미나실	회의 및 강의	21.5	1	21.5
	강의실	회의 및 강의	43.0	1	43.0
	연구실	교수연구실	21.5	7	150.5
	연구실	학생연구실	43.0	4	172.0
	공용면적	로비, 엘리베이터, 미화실, 화장실 등	403	-	403
	소계				790
지하 1층	주차장	장비·물품 등 이동 차량 반출입 등	750	1	750
	공용면적	창고, 전기실 등	250	-	250
	소계				1,000
지하 2층	주차장	장비·물품 등 이동 차량 반출입 등	750	1	750
	공용면적	기계실 등	250	-	250
	소계				1,000
총계	총계				7,500

※ 비고에 ‘Wet Lab’ 및 ‘Wet Lab 전환 고려’로 구분한 공간은 유틸리티, 가스, 위생, 흄후드 배기, 폐수 등을 고려해야 하며 이를 위한 PIT계획 등을 반영해야 함

※ 위 공간계획은 참고자료이며 공모작 제작 시 주어진 규모 내 연구실(가급적 남측), 실험실(가급적 북측) 배치 및 휴게공간(산업안전보건법 준수)의 구성, 협업연구 적용 등은 과업내용 안에서 자유로운 계획이 가능함

[붙임 9] 사업부지 현황

[현장사진]

[붙임 10〕 표준설계관리일정표

〔붙임 11〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식

□ ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식은 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 작성할 것

〔붙임 12〕 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표

□ ‘표준시방서 코드 링크표’ 는 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 활용할 것

〔붙임 13〕설계안전보건대장 작성 세부사항

설계자는 발주자에게서 제공받은 기본안전보건대장에서 제시한 유해/위험요인을 감소시킬 수 있는 설계안을 작성하여야 하며, 발주자와 유해/위험에 대한 위험성 감소대책에 대해 협의하여야 함.

설계자는 기본안전보건대장에 제시된 위험성평가의 절차와 안전보건관리 적용 법규 및 지침 등을 활용하여 안전한 설계를 수행하여야 한다.

설계자는 안전 설계의 내용이 포함된 설계안전보건대장을 작성하고, 발주자의 확인 및 승인 후 최종성과품으로 설계안전보건대장을 발주자에게 제출하여야 한다.

발주자가 설계안전보건대장의 내용에 대해 보완요청하는 경우, 설계자는 설계안전보건대장의 내용을 보완하여야 한다.

설계안전보건대장의 작성방법과 작성내용은 산업안전보건법의 규정을 따른다.

설계자는 설계 초기, 중반, 설계 완료 전에 안전보건전문가의 자문을 받아야 하며, 필요한 경비는 설계비에 포함.

발주자가 건설분야 안전보건 전문성을 갖기 어려운 경우와 발주자가 필요하여 안전보건전문가를 고용할 경우 발주자가 선정한 건설분야 안전보건전문가가 요구하는 내용에 대해 협의하고 결과를 설계에 반영해야 한다.