설계용역 과업내용서

사업명 :「하나라운지 건립 설계용역」

2024.  12.

충  남  대  학  교

(시 설 과)

	목 차

1. 건립목적	1

2. 과업의 개요	1

3. 과업범위	1

4. 용역 수행에 관한 특기사항	2

5. 설계의 기본 방향	4

6. 설계 개요	4

7. 설계 과업 내용	5

8. 설계 기본자료	11

9. 제출 도서명, 납품기한 및 부수	11

10. 설계도서 작성지침	12

11. 설계 유의사항	16

■ 붙임문서

□ 설계용역 예정 공정표	21

□ 사업부지 위치도	22

□ 세부시설계획(SPACE PROGRAM)	23

□ 납품 설계도서 목록	24

설계용역 과업내용서

1. 건립목적

가. 대학교 복지공간 및 휴식공간 조성

나. 지역거점대학으로 대지역주민과 대학구성원이 함께하는 공간을 확충하여 지역밀착형 국립대학 역할 제고

2. 과업의 개요

가. 대지위치 : 대전시 유성구 대학로 99(대덕캠퍼스 내) 영탑지 인근

※ [붙임2] 사업부지 위치도 참조

나. 대지면적 : 대덕캠퍼스 전체 면적 1,502,469.8㎡ 중 약 2,750㎡

다. 건물규모 : 연면적 600㎡

라. 건물용도 : 교육연구시설(부속시설)

3. 과업범위

가. 하나라운지 신축 설계: 충남대학교 하나라운지에 대한 건축,  구조, 토목, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 신재생, 조경, 부설주차장, 지장물 이설과 기타 부대시설의 기본 및 실시설계 용역

나. 녹색건축(우수등급이상), 제로에너지건축물(5등급이상) 예비인증 이행

다. 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙에 의한 장애물 없는 생활환경(BF)인증에 대비한 설계 및 예비인증 이행

※ 추후 공사 완성단계에서 상기 건에 대한 본인증 수행 시 적극 협조 한다.

라. 신축건물 부지 내 지하, 지상의 지장물 철거 및 이설에 대한 설계도서 작성

마.  건축협의(도시계획시설사업 실시계획인가 포함) 및 연구개발특구의 육성에 관한 특별법에 따른 입주변경승인 등 관계 행정기관과의 인허가 협의, 승인에 관한 설계도서 작성 및 제반사항 이행

바. 관계기관(조달청 등) 각종 심의자료 작성 및 심의결과에 보완사항에 대한 이행

사. 기타 본 사업과 관련하여 우리 대학교에서 요구하는 설계도서 작성

4. 용역 수행에 관한 특기사항

가. 전문업체 설계

1) 카페 인테리어 설계 및 시공 경험이 있는 인테리어 전문업체가 참여하도록 한다.

2) 전기, 통신 및 소방분야 설계는 전력기술관리법 제11조, 정보통신공사업법 제7조 및 소방시설공사업법 제11조에 의한 적격자와 계약하여 설계를 수행하여야 한다.

나. 계약금액의 변경

설계는 총공사비(1,980백만원-VAT포함)을 초과하지 않아야 한다. 부득이하게 총공사비가 초과되어 충남대학교가 동의하였더라도 본 용역 계약금액은 변경하지 않는다.

다. 설계도서의 보완

1) 발주청의 의견을 충실히 수용하여 본 설계에 반영한다.

2) 납품된 설계도서가 건축협의 및 기타 관계기관과의 협의 및 심의과정에서 지적되는 사항이 있을 때에는 수정 보완하여 제출하여야 하며, 시공 중 현장여건이 변할 때는 이에 맞게 설계도면을 수정 보완하여 제출하여야 한다.

라. 설계도의 변경

설계 결과 제시된 총공사비가 초과되어 충남대학교가 총공사비 범위 내 집행을 위해 설계도(평면, 입면 포함) 변경을 요구할 경우 계약자는 이를 수용하여야 하며, 설계공모 당선작품이라는 사유로 설계도서 변경을 거부하여서는 아니 된다.

마. 설계의 하도급

설계용역 범위의 일부인 토목, 조경, 기계 등의 설계를 타 업자에게 하도급

할 필요가 있을 경우에는 설계 착수 전에 자격증(사본)실적서 등을 첨부하여

본교의 사전승인을 받아야 한다.

바. 하자책임

시공 중 및 준공 후 설계 불완전으로 발생하는 하자와 설계수량의 착오로 본교에 피해가 있거나, 설계자로서의 의무와 필요한 조치를 이행하지 않아 발생하는 재정적 손해 및 민․형사상 모든 책임은 계약자에게 있다.

사. 보안유지

계약자는 설계내용 및 자료에 대한 보안조치를 취하여야 한다.

아. 설계감독

설계 수행은 발주자가 임명한 감독공무원 및 검수 공무원의 지시에 의한다

자. 계약의 해지

다음의 경우에는 발주자가 일방적인 계약을 해지하여도 이의를 제기하지

못한다

1) 계약조항 및 본 과업지시서의 지시사항을 명백히 이행하지 않을 경우

2) 계약자의 사정에 의하여 납품기한 내에 납품 할 수 없다고 인정 될 때

3) 설계내용을 외부에 누설하여 물의를 야기 시켰을 때.

4) 정당한 이유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지

않을 때

차. 용역수행 절차

1) 계약자는 계약일로 부터 7일 이내에 착수계 및 예정공정표(계획, 중간 및 실시설계로 구분 작성)와 본 용역에 참여 할 기술자의 면허증사본과 이력서, 참여자 명단 및 담당업무 등을 제출하여야 하며, 또한 용역수행 중 변동사항이 있을시 변동사항을 즉시 제출하여야 한다.

2) 설계용역은 계획 및 중간설계 도서 납품 후에 실시설계 도서의 최종검토를 받아야 하며, 용역설계 최종보고서에 모든 참여기술자 및 업무수행 사항 등을 기록하여 제출하여야 한다.

카. 용역시행기간

1) 본 설계의 시행기간은 착수일로 부터 150일간으로 한다.

본 설계의 용역기간에는 관계기관의 각종 심의, 승인에 필요한 기간 및설계와 관련된 자문회의 심의기간 등이 포함된다. 다만, 다음의 사유에 한하여 발주자와 계약자간에 협의하여 본 설계기간을 연장 또는 정지할 수 있다.

가) 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 중단되었을 경우

나) 발주기관의 방침에 의하여 과업수행이 중단되었을 경우

다) 관계기관의 인․허가 관련 협의, 자문, 심의, 인증 등의 행정절차 소요기간 및 이로 인하여 최종 보고된 설계도서의 수정이 필요한 경우

라) 기타 발주기관이 정당하다고 인정할 수 있는 사유가 발생한 경우

2) 용역설계 시행완료 이전이라도 발주자의 요구가 있을 경우에는 부분적 으로 정리하여 그 성과를 제출토록 한다.

타. 설계방법

설계지침과 건축물의 설계도서 작성기준 등 일체의 관계 법령 및 계약서에 명시한 제반조건(계약일반조건, 특수조건 등)에 의거 설계를 실시하여야 한다.

5. 설계의 기본방향

하나라운지 건립 설계공모 당선작을 기초로 다음과 같은 사항들을 검토, 추가 반영하여 설계한다.

- 토지이용계획에 부합하는 건물 배치 및 설계

- 주변 자연환경의 보존과 합리적인 토지이용

- 주변 건축물과의 형태적 조화미 추구

- 사람, 차량, 각종 물자의 효과적이고 원활한 활동 및 차량 이동 동선 확립

- 주변 환경조건 및 건물기능과 부합하는 외부환경조성

- 각종 표지와 가로등 등의 부대시설 및 수목조경은 주변 건물과의 통합 디자인이 될 수 있도록 설계

- 정보화 사회에 대비한 정보통신 사무자동화 및 건물 자동화 시설

- 실의 배치, 기능의 상호보완 등을 종합적으로 수용하여 설계

- 구조계획의 합리성(모듈, 층고 등)

- 건물 내․외부 마감 재료 및 시공방법의 최적성

- 향후 확장 가능성 검토 및 제반 관계법규에 적합한 설계

- 지하 지장물 이설(토목, 기계, 전력, 통신 선로 등)계획 수립 및 설계

- 설계하는 건축물과 조화로운 영탑지(분수설비 및 경관조명 포함) 개선방안 도출 및 설계

6. 설계개요

가. 건   축

1) 구 조 : 철근콘크리트조 또는 철골조

2) 규 모 : 연면적 600㎡

나. 토   목

1) 토  공

2) 부지정지 및 포장

3) 배수 시설물 및 정화조

4) 기타 구조물 및 조경

5) 주차면적(면수)

다. 기   계

1) 냉․난방 설비

2) 공기조화 및 환기 설비

3) 급․배수 위생설비

4) 소화 설비

5) 가스 설비

6) 자동제어 설비

7) 분수대 설비

8) 기타 우리 대학교에서 제시하는 제반 설비

라. 전기 및 통신

1) 수․배전 및 간선설비(예비전원설비 포함)

2) 동력설비

3) 전등 및 전열설비

4) 접지 및 피뢰설비

5) 자동화재 탐지설비, 피난설비

6) 엘리베이터설비

7) 방범설비

8) 전화설비

9) LAN설비(무선 랜설비 포함)

10) TV 공청설비

11) 방송설비

12) 지하 지장물 이설

13) 기타 우리 대학교에서 제시하는 제반 설비

마. 제로에너지 건축물(5등급 이상) 인증을 위한 신재생 에너지 설비

1) 지열

2) 태양광 등

7. 설계과업 내용

가. 건축부문

1) 본 설계는 주변여건과 연계하여 충남대학교 휴게시설로 상징성을 갖는 조화된 입면계획이 이루어져야 하며 수용인원과 실의 크기에 적정성을 고려하고, 기타 관계법규에 위배되지 않도록 설계되어야 하며 관계법규 검토서를 작성 제출한다.

2) 본 설계는 충남대학교의 토지이용계획 주요사항을 준수하여야 한다.

3) 본 설계는 교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률에 따라 교육시설안전인증기준에 적합하여야 한다.

4) 설계도서(설계도면, 내역서, 규격서, 각종 계산서)가 상호 일치되게 작성한다.

5) 건물은 미적이며 견고성을 유지할 수 있도록 설계되어야 하고 주위환경을 최대한으로 보호 이용할 수 있어야 한다.

6) 구조계획과 내․외장 계획 및 급․배수 계통도 등은 장차 증설을 고려하여 종합적으로 계획한다.

7) 건물의 외벽 및 외부에 면하는 창과 최상층의 반자 및 최하층의 바닥은관계법규에 맞도록 단열성 있는 구조로 한다.

8) 마감재료는 내구성이 있으며 쾌적한 질감을 얻을 수 있는 재료를 선택하고 유지관리 측면을 고려한다.

9) 우수 및 하수처리는 중앙간선 수로 및 건축물 주변의 맨홀 등을 면밀히  검토하여 계획한다.

10) 건물에 사용되는 구조재 및 마감재는 국산품(KS표시품) 사용을 원칙으로  하고 성능, 유지 관리상 수입품 사용이 불가피한 경우에는 경제성을 비교 검토하여 외국산 제품으로 설계할 수 있다.

11) 방수재료와 공법은 그 적정성을 검토하고 방수층을 통과하는 각종 배관  주위는 방수대책을 충분히 강구한다.

12) 개구부 주위의 누수방지대책은 충분히 연구하고 외벽의 실내에 면한 부분의 구조는 결로 방지책을 연구하여 노점온도 이상이 되도록 처리한다.

13) 콘크리트 구조물 설계시 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 및 「학교시설 내진설계기준」에 적합하도록 하고, 안전하고 경제적인 설계방법을 채택할 수 있도록 한다.

14) 본 설계는 부지내의 종합적인 계획(건축, 토목, 조경)에 의거 기본 및 실시설계가 이루어져야 한다.

15) 본 건물의 배치 및 주변환경(보행로 및 도로, 주차장, 조경, 정화조, 기타부대시설의 배치 등)계획은 향후 계획 건물을 고려하여 설계한다.

16) 정화조 설계는 하수도법 시행령 제24조 제2항의 개인하수처리시설 설치 기준에 부합되도록 설계하여야 한다.

17) 주변환경 및 향후 계획건물과의 연계동선을 고려하여 건물의 진입이 용이하도록 한다.

18) 배치도에는 시공좌표(토목 현황측량 기준점에 의한 지적좌표)를 삽입한다.

19) 냉․난방에 필요한 기계실 면적과 각종 배관 및 덕트의 설치공간은 충분하게 계획되어야 한다.

나. 토목 부문

1) 기존 건물과의 연계성을 고려한 합리적인 동선계획을 수립해야 한다.

2) 주차공간은 법적기준에 맞게 설계되어야 한다.

3) 설계도서(설계도면, 내역서, 규격서, 각종계산서)가 상호 일치되게 작성한다.

4) 기존 공동구 간섭을 고려한 합리적인 기초 구조 계획

5) 부지계획도는 주변부지와 연관관계를 알 수 있도록 하고 부지별 계획고를 명시하여야 한다.

6) 현황 도면은 좌표 및 지적선을 삽입하여 작성하고 BM(수준고)을 표시하여야 한다.

7) 인허가에 필요한 지적도, 구적도, 토지조서를 작성한다.

8) 각종 구조물은 초급기술자, 기능공들이 쉽게 이해할 수 있도록 시공 상세도를 작성한다.

9) 조경 설계는 토목 내역서에 포함하여 설계한다.

10) 사토운반에 대하여 현장조사, 수요기관 협의, 토석정보공유시스템 등을 통한 사토장을 선정하고 구간별 도로 및 교통 여건에 따른 운반조견표를 작성하여야 한다.

11) 대기환경보전법 제28조에 의거 작업현장에서 발생하는 비산먼지의 발생 등 오염 방지를 억제하기 위한 필요한 조치를 하여야 할 경우 오염방지 시설을 설계에 반영한다.

12) 본 공사의 건설 폐기물 처리는 폐기물관리법에 의거 설계에 반영한다.

13) 하수관리 설계는 다음 사항을 참고하여 설계하여야 한다.

가) 하수관은 하중에 대한 내구성과 내부식성, 내마모성 및 수밀성이 확보  될 수 있는 관종으로 설계되어야 한다.

나) 성토구간 등 연약지반은 부동침하가 발생하지 않도록 설계한다.

다) 하수관의 수밀성 확보를 위하여 하수관의 접합은 반드시 고무링을 이용하여 수밀성이 확보될 수 있도록 설계한다.

라) 관거의 경사는 유속이 1.0～1.8 M/초를 유지하도록 하여 하수의 정체 및 오수 침전물의 침전방지 및 관거의 내구년수를 확보할 수 있도록 한다.

마) 하수관거와 횡방향으로 관을 연결하기 위하여 하수관거를 천공할 때에는 반드시 천공기를 사용하여 연결하도록 설계하고 연결부분의 수밀성이 유지될 수 있도록 설계한다.

바) 되메우기 재료는 다짐이 잘되는 양질토를 사용하도록 설계하고 다짐은 도로 노체와 같은 수준의 다짐을 시행하도록 설계한다.

다. 기계 설비 부문

1) 냉, 난방설비

가) 쾌적한 환경이 보장되는 설비 계획으로 원활히 제 성능을 발휘할 수

있도록 하여야 하며 에너지 절약형으로 설계한다.

나) 실별 사용시간 및 용도에 따른 적응성과 부분부하 발생에 따른 에너

지 소비를 최소화하고 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

2) 위생설비

가) 기존 급수관에서 분기하여 인입하는 것으로 계획하고 분기지점의 기

존 관경 및 수압 등을 면밀히 검토하여 용량이 부족할 시는 용량증설

등을 본 설계에 반영하여야 한다.

나) 배수계획은 분류식으로 하고 통기관을 두어 악취를 제거토록 하여야

한다.

다) 급탕을 위한 저탕량과 가열방식 등은 가장 경제성 있게 계획하고 저

탕조 및 공급배관 등은 내식성 자재로 설계하여야 한다.

라) 수도계량기는 원격통신이 가능한 계량기로 설계하여야 한다.

3) 환기설비

기계실, 전기실, 화장실 등 환기가 필요한 실에는 용도에 따라 필요 환기

량을 산정하여 충분한 환기가 될 수 있도록 계획한다.

4) 소화 설비

소방법 등 관계법규 적용 여부를 검토하여 적법한 건물의 소화 설비를 갖

추어야 한다

5) 가스설비

냉․난방 기기의 연료 및 실험용 가스시설이 요구될 경우 고압가스 안전

관리법, 도시가스 사업법, 소방법, 건축법 등과 이외의 시공을 위한 고시,

조례 등을 검토하여 적법하게 설계한다

6) 자동제어설비

가) 효율적인 에너지관리에 적합하도록 계획하고 종합적인 운전관리가 가능하도록 설계한다.

나) 학내에 설치될 ‘캠퍼스에너지관리시스템(BEMS)’에 에너지원별 계측값과 에너지용도별 계측값 및 기타 설비 제어를 연결하도록 설계한다.

7) 분수대 설비

가) 영탑지(학내 연못) 영탑지 내 기존 분수대를 건축물과 조화롭게 개선할 수 있도록 설계한다

나) 분수대 제어패널을 현장실정에 맞게 설계한다.

다) 연못 보충수(지하수) 공급 설비를 설계한다

8) 기타부대설비

발주자가 요구하는 부대 설비에 대하여도 가장 적합한 설비를 설계하여야

한다.

라. 전기설비부문

1) 수 변전 및 간선설비

가) 전력인입은 발주처와의 협의에 의하여 결정한다.

나) 변압기 용량은 추후 증설 가능성에 대비하여 여유있게 설계한다.

다) 간선은 각 분전반의 용량을 적정하게 분담하여 회로를 구성한다.

라) EPS는 기기설치 및 유지보수가 가능하도록 충분한 공간을 확보한다.

마) 비상용 발전기는 관련 법규 및 건물의 용도를 고려하여 설치를 검토하여 설계에 반영한다.

2) 동력설비

가) 부하별, 용도별로 구분하여 동력제어반을 구성하고 제어는 현장여건에

맞도록 계획한다.

나) 전원공급용 케이블을 케이블트레이 또는 배관을 사용하여 배선하도록

계획한다.

3) 전등 및 전열설비

가) 조명설비는 각 기능별로 조도기준을 정하고 에너지절약을 고려하여

고효율기기를(LED조명기구) 선택하여 설계하며 점멸스위치도 분화하고 창측은 별도 점멸이 가능하도록 한다. (단 프로젝터를 사용하는 실은 스크린을 기준으로 열별 점, 소등이 가능하도록 한다)

나) 조명기구는 건축 마감재에 부합되게 설계하고, 친환경 제품으로 설계

한다.

다) 전열기구는 사용자의 편의를 최대한 고려하여 전기기구의 사용예상

위치 및 용량을 충분히 검토하여 배치토록 한다.

라) 최상층의 전등배관은 천장속 노출배관으로 설계한다.

마) 노출분전반 상부에는 향후 증설이 용이하게 예비배관을 반영한다.

바) 바닥 시스템복스 설치 위치는 각 실별 집기류(가구, 책장, 책상 등) 배치를 고려하여 설계에 반영한다.

4) 접지 및 피뢰설비

가) 접지설비는 관련법규 및 기준에 따라 계획하고, 증축 부지의 대지조건

을 고려한 접지 설계를 하여야 한다.

나) 뇌 보호시스템은 KSC IEC규격을 적용하여 설계한다.

5) 소방설비(자동화재탐지설비, 피난설비 등)

가) 관련법규 및 기준에 적합하도록 설계한다.

6) 기존 건물 지하 지장물 이설(공동구, 전력 및 정보통신 선로 등)계획을

수립하여 설계에 반영한다. 특히 기존 사용 중에 있는 건물에 지장이

없도록 한다.

7) 신재생에너지로 태양광발전설비를 반영하여 설계하되 지상에서 집열판이 보이지 않게 배치하여 설계한다.

마. 정보통신설비부문

1) 전화설비, TV, LAN설비, 방범설비, 방송설비 등은 현재뿐만 아니라 장차

증설에도 능동적으로 대처할 수 있도록 배선, 배관, 기타관련 설비를 설치

하여야 한다.

2) 각종장비가 설치되는 공간은 유지보수를 고려하여 충분한 면적을 확보한다.

3) 정보통신장비 및 선로는 우리대학교에서 사용 중에 있는 전산망과 호환

되고 장비의 사양은 기존장비 동등이상 제품으로 설계한다.

4) 출입통제시스템 설비는 우리 대학에 구성되어 있는 방식으로 설계한다.

5) 전산장비선정은 기존 우리대학에 설치되어 있는 장비와 호환되는 장비로 정보통신원 담당자와 충분히 협의 후 설계에 반영한다.

바. 건축설비에 관한 사항

1) 건축물 에너지절약 설계기준에 의한 합리적인 열부하 계산

2) 최적의 냉난방 방식 채택

- 에너지 절약 시스템으로 설계

- 부분 부하운전에 대비한 시스템 구성

- 고효율의 열원장비 선정

3) 기계실의 규모는 유지관리를 고려하여 기기를 배치하고 점검에 필요한

충분한 공간을 확보한다.

4) 종합적인 운전관리 시스템 설계

5) 화장실의 충분한 환기로 실내 취기 확산 방지고려

6) 인텔리전트에 대비한 시스템반영

- 향후 OA기기 부하에 대응할 수 있는 용량선정

- 건물의 확장성 및 통합화에 대응할 수 있는 빌딩 오토메이션 시스템 채택 고려

7) 충남대학교 구축예청 BEMS와 연계할 수 있도록 건물에너지관리시스템을 구축한다.

사. 제로에너지 건축물(5등급 이상) 인증을 위한 신재생 에너지 설비

1) 지열

2) 태양광 등

8. 설계 기본자료

가. 사업부지 위치도

나. 기타 본교에서 제시하는 자료

다. 세부 시설계획(Space Program)

9. 제출 도서명, 납품 기한 및 부수

가. 계획설계

하나라운지 당선작에 대하여 설계과업지시(내용)서에 제시한 사항을 추가로 반영, 발주처와 협의 완료 후 계획설계에 착수한다. 납품하여야 할 도서명, 납품기한과 부수는 별첨 목록과 같다.

나. 중간설계

승인된 계획설계를 기초로 하여 작성하며, 납품하여야 할 도서명, 납품기한과 부수는 별첨 목록과 같다.

다. 실시설계

승인된 중간설계를 기초로 하여 작성하며, 납품하여야 할 도서명, 납품기한과 부수는 별첨 목록과 같다.

라. 건축물대장 등재에 따른 현황도면을 소정양식에 작성하여 제출하여야 한다.

10. 설계도서 작성지침

가. 작도용 용지

작도용 용지는 영구보관에 지장이 없는 품질을 사용한다.

나. 도면규격과 양식

도면원도의 크기는 594㎜×841㎜로하고 윤곽선 건명판 등 양식은 별도

승인 받아 사용토록 한다.

다. 치수기입 및 단위

설계도면에 기입되든 단위는 미터법으로 하고 치수는 ㎜로 표시한다.

라. 표기문자

표기문자는 한글 사용을 원칙적으로 하되 한글만으로 이해가 어려울 경우

와 감독관이 지정하는 영문 및 한자로 병용 표기하며, 표기숫자는 일체

아라비아 숫자를 사용한다.

마. 축척

도면의 축척은 도면에 적합한 것을 사용하고 동일종류에 대하여는 가능한

축척을 통일시켜야 한다.

바. 도면번호 표기방법은 아래와 같다.

1)  토목일반도면 : C

2)  건축일반도면 : A

3)  건축구조도면 : S

4)  기계설비도면 : M

5)  전기설비도면 : E

6)  소방설비도면 : F

7)  정보통신설비도면 : T

8)  정화조  도면 : EN

사. 도면 작성시의 일반요령.

1) 도면은 AUTO CAD로 작성 하는 것을 원칙으로 하며, 설계도서 납품시

CD-ROM 저장방법 표준화 프로그램간의 상호 호환성을 유지할 수

있게 한다.

2) 설계도서 납품목록(설계도면, 시방서, 내역서, 투시도 등) 전체를

CD-ROM에 저장하여 납품하여야 하며, 내역서에 대해서는 조달청에서

선정한『시설공사응용프로그램』으로 내역서를 작성 후 프로그램상호간

호환 포맷인 텍스트 파일(.TXT)로 변환 제작하여 제출하여야 한다.

3) 도면 수정 시 수정부분 위치표시와 내용을 표시한다.

4) 각 도면마다 도면 목록을 작성하고 방향표시, 단면표시, 상세표시, Key

Plan 및 보기를 넣어 설계해당부분을 찾을 수 있도록 한다.

5) 모든 도면상에는 가능한 한 측 부호, 라멘부호 설명을 기입하여 어느

부분 인가를 알기 쉽게 한다.

6) (건축, 기계, 전기, 정보통신...등)의 계획에 따른 기구 등의 설치 위치를

표시한 통합 평면도 및 전개도를 작성한다.

7) 기계, 전기, 통신 등의 각종 장비 및 기기의 설치에 대한 내용을 기입한다.

아. 건축도면 작성 시 특기사항

1) 건축 설계도서에는 다음내용이 표시되어야한다.

표지, 도면목록표, 건축개요(건물개요, 건물면적산출 및 실별면적표),

외부투시도,  실내․외마감재료표, 배치도, 부분배치도, 주차계획도,

각층평면도, 일반단면도, 입면도(4면 이상), 평면상세도, 주단면상세도

(KEY PLAN기입), 부분상세도, 천장평면도, 벽전개도, 계단평면․단면상

세도, 기타상세도, 창호일람표, 각층창호평면도, 기타 필요도면

2) 건축구조 도서에는 다음내용이 포함되어야 한다.

주심도, 각층구조 평면도, 기초, 보, 슬래브 및 골조 등 일람표, 각층

슬래브 배근상세도 및 전개도, 구조 상세도, 라멘도 기타 철근배근 및

정착방법, 정착 길이, 철근 간격 등 세부상세도

3) 구조도의 철근 정착 이음 등을 정확히 표시하고 라멘이 다를 때마다

반드시 라멘배근도를 작성한다.

4) 구조도의 주요부분은 현장 기능공들이 쉽게 알아볼 수 있도록 시공상세

도를 작성하여야 하며 시공상세도 작성 시 다음 사항을 유의하여 작성

하여야 한다.

가) 철근 배근도에는 정부 철근 등의 유효간격유지용 및 철근 피복두께

(측. 저면)유지용 스페이서 및 Chair-Bar의 위치, 설치방법 및 가공을

위한 상세도면을 작성한다.

나) Spacer 또는 Chair-Bar등은 철근 및 콘크리트 타설 시의 하중에도

각종철근간격이 충분이 유지될 수 있도록 그 위치를 도면상에 명기

하여야 한다.

다) Spacer 또는 Chair-Bar등의 철근 가공 및 설치 상세도에는 주철근 등

각 철근간의 순간격, 거푸집과 철근간의 순간격등을 고려하여 그 수

치를 표시 하여야한다.

라) 시공이음, 신. 수축 이음부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용재료(채움

재)등에 대한 상세도면과 시공법을 작성 표기하여야 한다.

마) 철근 겹 이음 길이 및 위치 :

․ 철근의 이음부는 구조상 약점이 되는 곳이므로 최대인장 응력이

작용하는 곳에서는 이음이 되지 않도록 하여야 한다.

․ 겹 이음 길이는 철근 콘크리트 시방규정에 따라 충분한 이음길이를

두어야 하고 동일단면에 집중되지 않도록 겹 이음 길이, 겹 이음

위치 등의 도면을 작성하여야 한다.

바) 연속 슬래브 콘크리트타설 시공순서 및 시공법등을 도면상에 명기

하여야 한다.

사) 도면상에 표시 되지 않는 부분은 도면 하단에 주서로 설명을 하여야

한다.

아) 슬래브 배근도는 슬래브 종류마다 상세히 도면을 작성한다.

5) 각층 평면도상 각 실의 실명, 실 번호, 실 면적을 직접 기입한다.

(축척:1／50, 1/100, 1／200.)

6) 중요한 부분은 반드시 부분 평면상세도(축척:1／30) 및 전개도, 부분단면

상세도를 작성한다.

7) 창호평면을 작성하고 창호 상세도에 개소, 크기, 위치, 부속철물, 유리

규격 등을 상세히 명기한다.

8) 천장평면도는 반드시 작성하고 천장부측 전등기구를 전기설계 또는

기타도면과 부합되도록 작성한다.

9) 수량산출서는 각 공종별, 층별로 산출 및 집계가 이루어져야 하며, 철근

수량 산출시 정착, 이음개소, Spacer-Bar등이 누락되지 않게 산출한다.

10) 설계도서에는 건축법 및 관계해당 법규에 위배되지 않아야 한다.

11) 설계원도용 외부투시도는 채색하지 않고 연필로 명암효과를 내도록 한다.

자. 토목도면 작성시의 특기사항

토목제도 통칙(KSF 1051)을 참고로 작성하여야 한다.

차. 기계도면 작성시 특기사항.

1) 기계설계도서 작성 시 건축 및 전기설계에 부합되도록 상호 협조하여

작성한다.

2) 옥내 주배관등은 횡단면을 작도하고 배관의 구배를 표시한다.

3) 평면도에서는 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 취부 상세 및 부분별

상세도를  반드시 작도한다.

4) 화장실 기타 중요한 시공 부분은 평면도 이외에 계통도를 다이아 그렘

방식으로 표시한다.

5) 장비, 위생기구, 방열기 등의 중요 자재에 대하여는 도면에 목록표를

기재하여 알아보기 쉽게 한다.

6) 축척1／100의 건축 평면도에 설계하여야 하고 반드시 축부호, 라멘부호

를 기입하여 어느 부분인가 쉽게 알아볼 수 있어야 한다.

7) 옥내 및 피트 배관시 건축구조상 보(BEAM)를 관통할 경우에는 보관

통 스리브 도면을 별도 작성하여야 한다

8) 주요부분이 1／100축척도면으로 해득하기 어려운 곳은 반드시 확대

평면상세도 (축척 1／50또는 1／30)단면 상세도를 작성하여야 한다.

9) 각종배관의 구배는 관계규정에 충분하도록 건축등에 반영하여 기능을

발휘하는데 무리가 없도록 하여야 한다.

10) 기타 설비관련 부대시설의 도면도 작성되어야 한다.

카. 전기 및 정보통신 도면 작성시의 특기사항.

1) 설계시 작성된 도면은 건축 및 기계등 제반 설계내용과 부합되도록

상호 협조하여 작성한다.

2) 평면도는 반드시 전등, 전열, 동력, 간선, 화탐, 방송, 약전, LAN 등으로

각각 작도한다. 단, 약전은 같은 계통별로 구분처리 한다.(예: 전화, 인터 폰)

3) 도면은 1/100축척으로 작성함을 원칙으로 하고, 부득이 한 부분은 축소

또는 확대하여 작성하며 열 부호 및 실명, 실 번호는 반드시 기입한다.

4) 주요한 부분은 반드시 평면상세, 단면, 부분상세 등을 작성한다.

5) 제어반의 결선도, 내부 및 외부 상세도를 작성한다.

6) 각종제작품은 상세한 제작도면을 작도한다.

7) 평면도에서 표시된 식별하기 곤란한 부분은 취부상세 및 부분 상세를

반드시 작도한다.

8) 모든 설계도는 전기설비기준에 관한규칙 및 정보통신법규에 적합하도록

한다

타. 각종표시

1) 마감재료의 표시

마감재료는 해당개소를 □→□표로 인출하여 부재명, 재료명, 규격, 마무

리, 색채처리 순으로 표시함을 원칙으로 하며, 재료규격의 크기는 길이×

폭×두께 순으로 한다.

2) 재료 단면표기.

재료 단면 표기는 건축, 토목, 기계, 전기재료 규정에 준하되 통일을 기

하여야 한다.

3) 단면 위치표시는 다음 보기의 요령으로 작도한다.

〈보 기〉

가). 단면을 표시하는 경우.

(단면표시)

B

□□□□□□□□□                □□□□□□□□□□  도면 단면표시

A - 21

나). 입면 또는 전개도를 표시한다.

C

□□□□□□□□□                □□□□□□□□□□  도면 입면표시

B - 21

다). 부분 상세기호.

A       (보기)

□□□□□□□□□

A - 21   일련번호

4) 단면의 위치를 확인할 수 있도록 실명을 기입한다.

5) 도면 각장 마다 설계사의 성명을 기입하고 날인한다.

파. 상세 통일

본 공사의 설계는 종합캠퍼스 건물군의 일부분임으로 전체적으로 통일성

있게 처리되어야 하며, 각종 상세 부분의 표준안을 사전에 협의한 후 본

설계도면을 작성한다.

12. 설계 유의사항

가. 건축물의 조형미 구현

건축물은 미적으로 설계되어야 하며 견고성을 유지하여야 한다.

나. 에너지 절약 정책 실현

1) 에너지절약 정책실현

가) 열원기기, 펌프, 탱크, 배관 등 장비는 최대의 효율을 올리도록

하고, 각 기기별 여유계수를 적절히 고안 경제적 용량으로 설계한다.

나) 전기설비 설계는 정부의 승압 계획에 따르며 고효율기기로 설계한다.

다) 수전 설비의 용량 결정에서 수용율을 적정치로 선정한다.

라) 조명설계는 조도기준에 의하되 가급적 자연 채광을 이용하는 방안

을 강구한다.

2) 열관리 구조의 설계

냉. 난방을 필요로 하는 건축물의 외벽 및 외부에 면하는 창과 최상층의

반자 최상층의 바닥은 관계규정에 맞도록 단열성 있는 구조로 설계되어

야 한다.(에너지 절약을 위한 구조내용을 설계심사요청서에 명기하여

제출한다)

다. 일반 사항

1) 충남대학교의 장기발전계획에 부합된 세부설계가 작성되어야한다.

2) 각 시설의 설계는 안전성, 경제성, 시공의 적정성 및 기능면에서 합리성

이 있어야 하며, 가능한 한 조형미의 구현을 위한 설계가 되어야 한다.

3) 작성된 각종설계도면은 상호 그 내용이 합치되어야 하고 해석이 용이하

도록 설계되어야 하며 특히 다음 사항을 검토 할 것.

설계도면 규격서, 각종계산서, 건축, 토목, 기계설비, 전기설비. 통신, 환경.

라. 건물 설계에 관한 사항

1) 사용 자재 및 장비의 공급원 조사

가) 골재(자갈, 모래 등) 및 석재의 채취원

나) 건설장비 동원계획.

다) 기타사용자재의 공급원.

라) 정전 시에 대비한 비상전원 구성

2) 건물용도 및 규모에 적정한 내, 외장 재료의 선택.

가) 재료의 내구성(강도 등) 고려 할 것.

나) 재료의 색상, 질감 및 모양을 고려 할 것.

다) 재료내연 및 내화성을 고려해서 설계.

라) 재료의 경제성을 고려.

3) 비상시에 대응하기 위한 시설필요.

가) 피난시설(피난계단, 지하실, 도로, 비상구 및 옥외 공간)

나) 화재 시 연소방지를 위한 시설(방화벽, 방화문 등)

다) 방화상 필요한 구조 및 재료의 선택.

4) 건물 각 치수는 인체 및 사용기기 설비 치수에 부합 되도록 하여 건물

사용에 편리하도록 하여야한다.

가) 출입구 크기의 적정화를 기할 것

나) 천장고 및 창문 높이를 검토하여 일치 시킬 것.

다) 부대시설 크기 및 설치위치를 검토 할 것.

(창호철물 전원 조절 및 연결위치 난방 배관용 닥트 등)

라) 각부 치수는 표준화하고 자재의 규격화로 설계 할 것.

5) 사용이 적절한 통행시설확보 : 계단 및 경사로(계단의 위치, 폭, 단너비

및 경사로의 구배 마감면등 검토설계)

6) 에너지 절약형을 위한 건축설계.

가) 에너지 절약 설계 기준을 만족하도록 계획

나) 제로에너지 5등급 이상 득하도록 계획

7) 경제성에 입각한 건축설계.

가) 각 실의 기능 및 부대설비에 적정한 층고의 결정. 난방 열손실 층고

에 따른 시설 투자비, 보의 단면 설계방법(가급적 보의 춤을 낮추는

방안)등을 비교 검토하여 층고를 낮출 것

나) 사용 재료에 적당한 공법 채택

8) 창호 설치 설계의 적정화

가) 각 실의 기능에 맞는 창호 종류의 결정

나) 채광 및 환기를 위한 개구부 면적의 확보

다) 창호의 개폐방식, 방향, 크기의 적정화

라) 적정한 종류 및 크기의 창호부속 철물의 설치(내구성고려)

마) 창호용 재료의 규격품 사용명시

바) 창호의 폐쇄 시 밀폐가 되도록 정밀설계

9)  방수, 결로 방지대책에 관한 사항

가) 지하수압 작용에 따른 방수 대책

① 지하수위 및 수압 등을 고려하여 설계

② 방수재료 및 공법의 적정성 검토 설계

③ 방수층을 통과하는 각종 배관주위 방수대책강구

나) 우수 침투에 따른 대책

① 지붕 및 외벽부분에 대한 우수침투대책 검토 설계(방수재료 및

공법 선택결정)

② 개구부 주위 누수 방지 대책 고려

③ 돌출부분 등 물끊기(수절)처리

④ 화장실, 주방 등 물 사용실에 대한 방수대책 검토 설계

다) 결로 방지를 위한 검토 : 외벽의 실내에 면한 부분의 구조

(노점온도 이상이 되도록 한다)

10) 건물구조의 안정성에 관한 사항.

가) 지반조사를 시행하여 지반상황에 적합한 지정 및 기초구조 선택

- 적정한 지내력의 판단

- 기초의 구조 및 시공방법의 검토 설계

- 파일의 종류, 규격, 품질, 소요수량 검토 설계

나) 구조물이 작용하는 하중에 적정한 가정

- 적재하중, 자중, 풍압력, 적설하중, 수압, 토압, 진동, 내진설계 등.

다) 구조 내력상 필요한 내력벽의 설치 검토

- 내력상 필요한 벽량의 확보

- 내력벽의 두께 및 길이

- 내력벽의 구조 검토

라) 경제적이고 시공이 용이한 구조 선택

- 구조상 불필요한 부분의 삭제 및 과대한 부지단면의 축소 등 검토설계

- 시공 및 공법이 용이한 구조로 설계

- 구조의 안전에 필요한 부재의 최소단면 결정 설계

마) 구조물의 증축에 대비한 신축줄눈 설치

- 구조연장이 긴 경우와 이질재간의 접합부 기타 필요한 경우에 줄

눈 설치

- 설치 위치에 적합한 줄눈 종류의 결정설계

마. 건축설비에 관한 사항

1) 장비의 종류, 용량 및 기계실의 크기 결정.

가) 부하 계산상의 외기 및 실내 온, 습도의 적정한 선정.

나) 부하 계산에 의한 용량 결정.

- 기기별 여유계수를 적절히 감안 경제적인 용량이 되도록 설계.

- 각 기기는 최대의 효율을 내도록 설계.

다) 기계실의 규모는 유지관리가 용이하도록 적당한 크기(면적, 층고)를

확보할 것.

2) 방재 대책에 대한검토.

가) 소화설비의 관계기준에 따른 설치.

나) 노출배관계통에 대한 보온설계.

바. 전기 설비에 관한 사항

1) 정부의 승압 계획과 부합되는 설계(100／200V-220／380V)

2) 각실 용도에 적정한 조도설계.

3) 수전 설비 용량의 적정한 결정.

- 수용율의 적정치 채택.

- 설비용량 결정.

4) 관계기준에 맞는 음향 및 정보통신설비 계획.

- LAN설비, 전화 및 방송설비 검토설계.

- 음향설비에 적정한 계획 검토 설계.

사. 설계도면 작성에 관한 사항

1) 각종 표시 기호 및 방법은 관련 기준에 맞도록 표기 할 것.

2) 시공 및 적산이 가능하도록 각종 상세도를 작성.

- 각종 치수의 정확한 명기.

- 각종 사용 자재의 명칭기입,

- 각종 자재의 규격, 품질, 형태의 표기.

- 철근 배근도에 있어 절곡근의 위치 정착 및 이음길이 위치 등을 치수

로 명기 할 것.

- 각종 설비계통의 명확한 표시.

3) 설계도서상 설계책임자의 서명.

아. 시방서 작성에 관한 사항.

1) 시방서는 일반 시방서와 특기시방서로 구분 작성한다.

2) 특기시방서는 일반 시방서에 명기되어 있지 않은 다음 사항을 포함 작

성 하여야 한다.

3) 재료의 규격, 품질, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에

관한 사항을 명기 할 것.

4) 각종 자재의 설치방법.(가공, 조립, 부착 등)에 관한 사항을 명기.

5) 각종 가설물(가설물, 울타리, 흙막이 공법 등)에 관한 사항을 명기

6) 각종 구조공법 (말뚝박기, 배근, 용접 등)에 관한 사항을 명기.

7) 재료의 배합과 양생에 관한 사항.

자. 일반적인 유의사항

1) 설계용역에 필요한 문의나 건의 할 사항이 발생하였을 때는 임명한 감

독공무원 및 검사 공무원과 협의하여야한다.

2) 기타 과업지시(내용)서에 명기되지 아니한 사항은 감독 공무원 및 검수

공무원과 협의하여 처리한다.   끝.

[붙임 1]

설계조제 예정공정표

□ 용 역 명 : 하나라운지 신축공사 기본 및 설계용역

구 분	소요기간	설 계 용 역 기 간 ( 150일 )					비고
		30	60	90	120	150
계획설계	30
중간설계	30
실시설계 (각종 인허가 및 인증 기간 포함)	90

[붙임 2]

사업부지 위치도

1. 부지위치 : 대전시 유성구 대학로 99 (영탑지 인근)

2. 부지면적 : 2,750㎡

3. 지    목 : 학교용지(대지)

[붙임 3]

세부 시설계획(Space Program)

○ 사 업 면 적

용 도	면 적(㎡)
카페	195
아트홀	200	·가변형 벽
은행 무인점포	50	·ATM기 5개 설치(면적 변경 불가)
직원 휴게실	15
기계실 및 공유면적	140	·기계실, 전기실, 창고, 화장실, 계단, 홀 등 공용공간 포함
사업면적 계	600

[붙임 4]

납품 설계도서 목록

(원도 포함하여 청사진 제출부수는 추후 협의)

■ 사업명 : 하나라운지 건립 설계용역

2024.  12.

충  남  대  학  교

① 계획설계의 도서내용

종 류		내 용	도서작성의 구분
			기본	중급	상급
건축	공사비 개산서	재료․장비선정에 따른 개략 공사비
	법규검토	제반법규검토, 인허가절차 파악		○
		설계구상안		○
	건축계획서	설계개요		○
		배치계획		○
		평면계획		○
		입면계획		○
		단면계획		○
		외장재료 비교 분석
	모형	Sketch 또는 Study Model		○
	건축 도면	배치도		○
		대지 종․횡단면도		○
		각층 평면도		○
		입면도(2면 이상)		○
		단면도(종․횡단면도)		○
	심의 도서	심의대상인 경우
구조	구조계획서	구조계획개요		○
		기본 구조적용 시스템 및 대안, 경제적 타당성 검토
	심의 도서	구조심의 대상인 경우
기계	기계설비 계획서	건축주 요구사항의 수용여부와 설계방침의 확정		○
		기계설비 계획개요		○
		각종 개통도 및 zoning 계획
		적용 시스템 비교 검토
		개략 공사비 추정
	심의 도서	심의 대상인 경우
전기	전기설비 계획서	해당 법규 검토		○
		설계방향 설정, 전기설비계획개요		○
		추정 부하 산정
		개략 예산 검토
	심의 도서	심의 대상인 경우
토목	토목계획서	개략 흙막이 계획서
		흙막이 계획도
		우․오수처리계획서와 상수계획서
		예상공사비 계산서
조경	조경계획서	녹지 및 공개공지 계획도
		식재 계획도		○
		시설물 계획 및 포장계획도
	심의 도서	심의 대상인 경우		○
방재	심의 도서	법규체크리스트 및 소방개략계획서

② 중간설계의 도서내용

가. 건 축

종 류		내 용	도서작성의 구분
			기본	중급	상급
일반사항	개략 시방서	공사용 시방서(초안)
	공사비 개산서	기본설계 적용기준에 따라 개략공사비를 산정, 작성
	건축 계획서	공사개요(위치, 대지면적등)		○
		건축물규모(건축면적,연면적,높이,층수등)		○
		건축물 용도별 면적, 주차장규모		○
		배치계획
		주차 및 동선계획
		평‧입‧단면 계획
	법규 검토서	관련사항에 따른 법규검토		○
도면	도면 목록표	공종 구분해서 분류 작성		○
	안내도	방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록		○
	구적도	대지면적에 대한 기술		○
	실내재료마감표	바닥, 벽, 천정 등 실내마감		○
	배치도	축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청건물과 기존건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계		○
	주차 계획도	법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련위치 및 구조		○
		옥외 및 지하 주차장 도면		○
	각층 및 지붕 평면도	기둥‧벽‧창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치		○
		방화 구획 및 방화벽의 위치		○
	입면도(2면 이상)	주요내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수, 외부마감재료		○
	단면도(종․횡단면도)	건축물 최고높이, 각층의 높이, 반자높이		○
		천정내 배관 공간, 계단등의 관계를 표현		○
	투시도	투시도 또는 조감도		○

종 류			내 용	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
상세 도	수직 동선 상세도	코아 상세도	코아 내의 각종 설비관련 시설물의 위치
		계단평면 ․ 단면 상세도			○
		주차경사로 평 ․ 단면상세도
		주차리프트 평․단면상세도
	부분 상세도	지상층 외벽 평 ․ 입 ․ 단면도			○
		지하층 부분 단면 상세도			○
	천정도	천정 평면도
	창호도	창호 평면도
		창호 잡철물	각 창호에 적용되는 철물
기타	정화조	정화조 평면 ․ 단면도			○
		용량 계산서			○
	특수 분야 계획 검토	차음 ․ 방음, 방진
		무대 ․ 조명
		전시 ․ 미술장식품
		분수
		주방
		음향

나. 구 조

종 류		내 용	도서작성의 구분
			기본	중급	상급
일반 사항	개략 시방서	구조 일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
	구조 계산서			○
	설계 설명서			○
도면	기초 일람표			○
	구조 평면도	기초에서 옥탑까지 작성		○
	가구도	골조의 단면상태를 표현하는 도면으로 골조의 상호 연관관계를 표현
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도
	기둥 일람표			○
	보 일람표			○
	슬래브 일람표			○
	옹벽 일람표			○
	계단배근 일람표			○
	잡배근 일람표
	주심도			○

다. 기 계

종 류		내 용	도서작성의 구분
			기본	중급	상급
일반사항	개략 시방서	기계일반시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	각 공종별 단위면적당 공사비개념으로 개략 산정
	설계 설명서	계획설계시의 내용을 발전 확정		○
	개략부하 계산서	설계기준에 따라 단위면적당 부하를 기준
	각종 장비 선정서	부하 분석에 따른 적정 장비 선정
	에너지 심의서류	에너지 절약계획서 및 기타 서류
	소방시설 계획서	건물종별, 규모별, 층별 소방시설 계획에 관한 종합적 서류		○
도면	도면 목록표			○
	소방 설비도	해당 소방관련 설비		○
	장비 일람표	규격, 수량을 상세히 기록
	장비 배치도	기계실, 공조실등의 장비배치방안 계획		○
	계통도	공조배관설비 계통도		○
		DUCT설비 계통도		○
		위생설비 계통도		○
		소화 설비 계통도		○
	기준층 및 주요층 기구 평면도	공조배관설비 평면도
		DUCT설비 평면도
		위생,설비 평면도
		소화 설비 평면도		○
	저수조 및 고가수조	저수조 및 고가수조의 설치기준을 표시		○
	설비용 핏트 평면 상세도	설비용 핏트 상세 및 배치계획도면
	도시가스 인입 확인	도시가스 인입지역에 한해서 조사, 확인		○
	기구 상세도	기구의 선정		○

라. 전 기

종 류		내 용	도서작성의 구분
			기본	중급	상급
일반 사항	개략 시방서	전기 일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
	공사비 계산서	공종별 단위 면적당 개략 공사비
	설계 설명서	계획설계시의 내용을 발전 확장		○
	각종 부하계산서	용도별 조도, 부하계산서 작성
	소방시설 계획표	각종 설치시설에 대한 계획표		○
도면	도면 목록표			○
	배치도	옥외조명 설비 평면도
	계통도	전력 계통도		○
		조명 계통도
		통신 계통도
		소방 계통도		○
	평면도	조명 평면도
		소방 평면도		○
	상세도	조명기구의 선정		○

마. 토 목

종 류		내 용	도서작성의 구분
			기본	중급	상급
일반사항	개략 시방서	토목 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
	설계 설명서			○
도면	도면 목록표			○
	각종 평면도	주요시설물 계획		○
	대지 종․횡 단면도			○
	토공사 계획도
	포장계획 평․단면도			○
	보도블럭 평면도
	담장 계획도
	우․오수배수처리 평․종단면도			○
	상하수 계통도	우․오수배수처리 구조물 위치 및 상세도 공공하수도와의 연결방법, 상수도 인입계획, 정화조의 위치		○

바. 조경공사

종 류		내 용	도서작성의 구분
			기본	중급	상급
일반 사항	개략 시방서	일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
	설계 설명서			○
도면	도면 목록표			○
	조경 배치도	법정 면적과 계획면적의 대비, 조경계획 및 식재 상세도		○
	식재 평면도			○
	단면도			○

③ 실시설계의 도서내용

가. 건 축

종 류			축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
일반 사항	공사 시방서				○
	설개 개요				○
	각 공종별 공사비 내역서				○
	각종 계산서				○
	심의에서 각종 인허가 관련자료				○
일반 도면	표지				○
	도면 목록표				○
	안내도				○
	구적도				○
	지적도				○
	면적 산출표				○
	대지 종․횡단면도				○
	배치도		1/100이상		○
	주차 계획도		1/100이상		○
	평면도		1/100이상		○
	입면도(2면 이상)		1/100이상		○
	단면도(종․횡단면도 등)		1/100이상		○
	실내벽 및 반자의 마감도		1/100이상		○
상세 도면	수직 동선 관련 상세도	코아 평면상세도	1/5～1/50		○
		계단 평․단면상세도	1/5～1/50		○
		승강기.샤프트 평․단면상세도	1/5～1/50		○
		주차 경사로 평․단면상세도	1/5～1/50		○
		주차 리프트 평․단면상세도	1/5～1/50		○

종 류			축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
상세 도면	부분 상세도	주요부분 상세도	1/5～1/50		○
		주출입구부분 평,입,단면상세도	1/5～1/50
		부출입구부분 평,입,단면상세도	1/5～1/50
		샷다 상세도	1/5～1/50
		핏트 상세도	1/5～1/50
		발코니 상세도	1/5～1/50		○
		출입구 상세도	1/5～1/50		○
		지상층 외벽 입면․단면 상세도	1/5～1/100		○
		지하층 단면 상세도	1/5～1/100
		주요부분 내벽 상세도	1/5～1/100
	창호도	창호 일람표	1/5～1/50		○
		창호 평면도	1/5～1/50		○
		창호 상세도	1/5～1/50
		창호 입면도	1/5～1/50
		창호 잡철물 목록	1/5～1/50
	천정도	각층 천정 평면도	1/5～1/50
		천정 상세도	1/5～1/50
		부분 상세도	1/5～1/50
		천장 관련 설치 상세도	1/5～1/50
	내부 상세도	로비바닥 패턴도	1/5～1/50
		로비 전개도	1/5～1/50
		주요실 전개도	1/5～1/50
		승강기 HALL 전개 상세도	1/5～1/50
		화장실 전개 상세도	1/5～1/50
		칸막이 전개도 및 상세도	1/5～1/100
	실내부위	실내마감 상세도	1/5～1/50
	부품도	각 부품도	1/2～1/50
기타	정화조	건축용 평․단면도	1/5～1/100		○
		각종 설비도
		계산서
	특수분야 도면	소음․방진, 무대․조명, 주방, 음향, 전시, 미술장식품 등		별도대가업무

나. 구 조

종 류			축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
일반 사항	구조계산서 (법령에 의거 작성을 요하는 건축물)				○
	시방서				○
	설계 설명서				○
도면	도면 목록표				○
	구조 평면도		1/30～1/200		○
	구조 단면도		1/30～1/200		○
	기초일람표		1/30～1/100		○
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도		1/30～1/100		○
	기둥 일람표		1/30～1/100		○
	보 일람표		1/30～1/100		○
	슬래브 일람표		1/30～1/100		○
	옹벽 일람표		1/30～1/100		○
	계단배근 일람표		1/30～1/100		○
	잡배근 일람표		1/30～1/100		○
	주심도		1/30～1/200		○
상세 도	계단 및 코아 상세도	계단 상세도	1/30～1/50		○
		경사로 상세도	1/30～1/50		○
		코아 상세도	1/30～1/50		○
	접합 상세도	기둥접합 상세도	1/5～1/50		○
		보접합 상세도	1/5～1/50		○
		BRACE접합 상세도	1/5～1/50		○
		DECK PLATE 설치도	1/5～1/50		○
		STUD BOLT 설치도	1/5～1/50		○
		ANCHOR BOLT 상세도	1/5～1/50		○
	잡 상세도		1/5～1/50
	가구도		1/5～1/50
	각부구조 상세도		1/5～1/50
	기타 상세도	보 OPENING 위치도	1/5～1/50
		캐노피	1/5～1/50
		파라펫	1/5～1/50
		TRUSS	1/5～1/50

다. 기 계

종 류		내 용	축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술			○
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부공사비를 산정하여 작성			○
	부하 계산서	설계기준에 따라 세부 부하 계산			○
	설계 설명서	설계과정에서 확정된 내용 정리			○
도면	도면 목록표	도면목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기			○
	장비 일람표	주요장비의 사항을 알아보기쉽도록 표기			○
	옥외배관 평면도	옥외에서의 급배수, 도시가스, 유틸리등의 인입, 인출과 관경 및 위치등을 표시	1/100이상		○
	각 설비 계통도	각 설비별 계통 표시			○
	각 설비 평면도	공조, 환기, 위생, 소화설비등에 대한 내용등을 표시	1/100이상		○
	기계실 및 공조실 확대평면도	각 설비별 기계실 배관에 대한 확대평면도	1/5～1/50
	화장실확대평면 상세도	화장실 배관등에 대한 확대평면	1/5～1/50
	저수조, 고가수조 배치 및 상세도	설치기준을 표시, 평․단면도	1/5～1/50
	설비용핏트 상세도	설치 및 유지보수등을 위한 적절한 공간 검토 확인	1/5～1/50
	연도 상세도	보일러 및 발전기등의 연도상세	1/5～1/50
	각종 장비 상세도		1/5～1/50
	자동제어도면 (별도)	구성도
		장비,밸브,관제점,패널 일람표
		계통도 및 평면도

라. 전 기

종 류		내 용	축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
일반 사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술			○
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서			○
	각종 부하 계산서	변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량			○
	설계 설명서				○
	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기			○
	장비 일람표	주요장비의 사양을 표기			○
도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기			○
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상		○
		통신 배치도	1/100이상		○
		소방 배치도	1/100이상		○
	계통도	전력간선 계통도			○
		통신 계통도
		소방계통도			○
	평면도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상		○
		기계실 장비설치 평면도	1/100이상		○
		전력 설비 평면도	1/100이상		○
		조명 설비 평면도	1/100이상		○
		통신 설비 평면도	1/100이상		○
		방범 설비 평면도	1/100이상		○
		소방 설비 평면도	1/100이상		○
		방송 설비 평면도	1/100이상		○
	상세도	조명기구 상세도	1/5이상
		설비용 핏트 상세도	1/5이상
		피뢰침 상세도	1/5이상
		접지 설비 상세도	1/5이상
		TV안테나 설치 상세도	1/5이상

마. 토 목

종 류		내 용	축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
일반 사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술			○
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부 공사비를 산정하여 작성			○
	설계 설명서
도면	주요 평면도		필요축적		○
	대지종․횡 단면도		필요축적		○
	토공사 평․단면도		1/5～1/100		○
	흙막이 상세도	굴토깊이 10M 미만	1/5～1/50		○
	포장 상세도		1/5～1/50
	보도블럭 및 측구 상세도		1/5～1/100
	옹벽 평․단면 전개도		1/5～1/100		○
	옹벽 상세도		1/5～1/100		○
	담장 입․단면도		1/5～1/100
	담장 상세도		1/5～1/100
	방음벽 상세도		1/5～1/100
	지하매설 구조물 현황				○
	우․오수 배수 상세도	우․오수배수 처리 노선 상세도(평면도, 종․횡단면도) 및 구조물 상세도	1/5～1/100

바. 조 경

종 류		내 용	축 적	도서작성의 구분
				기본	중급	상급
일반사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술			○
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서			○
	설계 설명서				○
도면	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기			○
	배치도	공사계획 및 시설물배치도	1/100이상		○
	평면도	배식 평면도 및 수량 집계	1/100이상		○
		포장계획 평면도	1/100이상		○
		시설물 평면도	1/100이상		○
	입면도	식재 입면도 및 플랜터 전개도	1/100이상		○
	상세도	포장 평․입․단면 상세도	1/10이상
		지주목 상세도	1/10이상
		식재 및 수목보호용 덮개상세도	1/10이상
		조명등 상세도	1/10이상
		플랜터 상세도	1/10이상
		시설물 상세도	1/10이상