｢서천군 공유농업가공센터 신축공사｣ 기본 및 실시설계 용역

과   업   설   명   서

2023. 3.

	농 정 과

목    차

과업개요
1. 1.	과업의 명칭	………………………………………………	1
1. 2.	과업의 목적	………………………………………………	1
1. 3.	과업의 내용	………………………………………………	1
1. 4.	과업의 범위	………………………………………………	1
1. 5.	적용 범위	………………………………………………	3
1. 6.	과업 준수사항	………………………………………………	3
과업의 내용
2. 1.	단계별 제출서류	………………………………………………	5
2. 2.	업무보고 및 회의	………………………………………………	7
2. 3.	설계에 사용하는 재료	………………………………………………	9
2. 4.	에너지절약형 건축물 설계	………………………………………………	9
2. 5.	보안성 검토	………………………………………………	10

과업수행지침
3. 1.	법령 등의 적용기준	……………………………………………	10
3. 2.	설계 일반지침	……………………………………………	11
3. 3.	설계 기본방향	……………………………………………	14
3. 4.	설계진행시 유의사항	……………………………………………	17
3. 5.	설계도서의 분리작성	……………………………………………	18
3. 6.	설계도서표기	……………………………………………	18
3. 7.	도면작성	……………………………………………	19
3. 8.	기타 유의사항	……………………………………………	20
분야별 과업내용서
5. 1.	건축분야	……………………………………………	20
5. 2.	토목분야	……………………………………………	32
5. 3.	기계분야	……………………………………………	36
5. 4.	전기분야	……………………………………………	42
5. 5.	통신분야	……………………………………………	52
설계도서납품목록		……………………………………………	60
관련서식		……………………………………………	63

제1장  과업개요

1. 과업의 명칭

「서천군 공유농업가공센터 신축공사」기본 및 실시설계 용역

2. 과업의 목적

○ 최근 소비자들의 생활 패턴은 편의성을 추구하고, 건강을 중시하는 방향으로 변화함에 따라,  공유경제 플랫폼 개념을 선제적으로 도입하여 현행 원물중심으로 유통되는 농업 환경에서 벗어나기 위하여 다양한 농산물의 부가가치를 창출할 수 있는 가공센터 확보가 필요하다.

○ 가공센터는 단순 가공판매가 아닌, 안전하고 위생적이며 표준화된 품질을 생산할 수 있는 종합시설로 갖춰져야 하며, 이를 통하여 농업 · 농촌의 활력을 높이고, 농업소득을 향상시키고자 함.

3. 과업의 내용

가.「서천군 공유농업가공센터 신축공사」를 위한 기본 및 실시설계

- 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등

나. 각종 심의 인허가, 입찰, 계약 등 제반 행정절차 이행에 따른 협의 및 보고에 필요한 도서 작성

다. 기타 본 과업내용서에서 정하는 사항 등

4. 과업의 범위

가. 위    치 : 충청남도 서천군 마서면 장선리 287번지 일원

- 생산관리지역, 건폐율 60% 이하(농산물가공), 용적률 80% 이하

나. 사업규모

1) 부지면적 : 7,706㎡(2,331평)

2) 건축예정 규모 및 용도

가) 연면적 : 560㎡(±2%～3%)

※ 건폐율, 층수 제한 등의 법정 허용범위 내에서 층수 및 층별 면적을 합리적으로 제시  가능(단, 추정공사비 사업예산 범위 이내일 것)

나) 용    도 : 공장(농산물가공)

3) 추정공사비 : 1,820,000,000원 (부가가치세 포함)

4) 예정설계비 : 99,400,000원 (부가가치세 포함)

※ 계획·중간·실시설계, 및 설계손해배상공제보험료 포함

※ 각종 인증 대행【에너지효율등급 예비인증, BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증,제로에너지 건축물 인증 등】※ 인증수수료는 발주처에서 별도 납부

단, 설계자 선정 후 설계범위의 변경(각종 인증수수료 상향 등)시 발주부서와 협의하여 설계비는 조정될 수 있음.

※ 추정공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.;

※ 각종 인허가(농지전용허가, 지질 및 지반조사, 지하수 개발․이용허가 등)을 수반할 경우에는 발주처에서 별도의 용역으로 해당 업무 수행

5) 과업기간 : 본 과업은 착수일로부터 6개월로 한다. 다만, 사업추진과정에서 조정될 수 있다.

단, 발주기관의 요구로 추가용역 발생이나 기타 설계자의 귀책사유가 아닌 설계기간의 연장 필요시 기간을 연장할 수 있다.

6) 필요시설 및 기준

영 역	세 부 시 설	면적(㎡)	비율(%)	비 고
가공영역	습식 가공실	100		전처리실(30㎡), 저온창고(10㎡) 포함하며, 외부에서 전처리시설을 통해 습식가공실로 진입
	건식 가공실	80		기계실과 인접하며, 습식가공실과 인접하여 설치하며, 위생전실과 복도를 통해 진출입
	내포장실	60		외포장실로 생산품을 보내고, 위생전실과 복도를 통해 진출입
	외포장, 출고실	70		내포장실에서 생산품을 받아서 포장작업 후 출고하며, 내부에 물품창고(10㎡) 설치
	탈 의 실	30		로비를 통해 진입하며, 내부에 세탁실(6㎡), 위생시설(6㎡)을 포함해서, 위생전실에 인접
	위생전실	20		탈의실에서 진입하며, 복도를 통해 내포장실, 건식가공실, 기계실로 진출입
	복 도	30		위생전실을 통해서 출입하고, 기계실까지 연결, 내포장실, 건식가공실 출입
	소 계	390
관리영역	사무실	30
	소 계	30
영역별 면적 합		420	75
공용면적	기계실	25		1층 건식가공실과 인접하며, 복도를 통해 진출입하고, 외부로의 진출입도 가능
	휴게실	30		로비에 인접
	화장실	30		남녀분리
	로 비	55
	소 계	140	25
영역별 면적+공용면적		560	100.0
실 내 주차공간	옥내 지상주차		제외
	지하주차장
	소 계
총 연면적 (영역별 면적+공용면적+실내주차면적)		560	-

※ 세부시설에 대한 용도 및 면적은 설계 방향 및 발주자의 의견에 따라 변경될 수 있음.

7) 사후 설계관리

① 기    간 : 기본설계 완료 후 ~ 공사 준공

② 주요내용 :「건축서비스산업진흥법」제22조 및 서천군 ‘설계의도 구현’ 에 따라  건축설계가 완료된 후 공사시공 과정에서 설계도서의 해석, 자문, 현장여건 변화 및 업체선정에 따른 자재와 장비의 치수·위치·재질·질감·색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토·보완 등을 위하여 수행하는 설계업무를 말함.

※「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」제5조 제1호 다목의  규정에 따른     사후설계관리업무 대가는 제18조의 규정에 따른 실비 정액

8) 추진일정(예시)

① 용역발주 예정시기 : 2023년 2월∼5월

② 공사예정기간 : 2024년 1월 ∼ 2024년 11월(10개월)

③ 공사발주방법 : 미정

5. 적용범위

가. 본 과업은「서천군 공유농업가공센터 신축사업」기본 및 실시설계에 적용한다.

나. 본 과업은 서천군과「서천군 공유농업가공센터 신축사업」기본 및 실시설계 용역업자로 선정된 자(이하 “수급인”이라 한다) 간 체결한 용역에 적용한다.

다.  “수급인”의 용역범위는 용역계약서 및 본 과업내용서에 따른 설계도서 작성, 본 용역에 관한 각종 보고 및 자료 제출과 “발주기관”이 필요하다고 인정하여 지시하는 사항을 시행한다.

라. 설계도서는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」규정에 따라 작성한다.(국토교통부 고시 제2020-635호)

마. 본 용역은 각 분야별(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등을 포함) 설계에 해당된다.

6. 과업 준수사항

가. 기본 준수사항

1) 용역수행자는 건축물의 배치, 규모, 형태, 색채, 재료, 건축설비, 구조 등에 대하여 주변과의 조화, 경관, 안전성, 기능, 관련법규 및 규정, 경제성 등을 감안하여 최적의 미와 성능을 발휘할 수 있는 디자인으로 설계해야 한다.

2) 설계 납품 전에 관계법령에 해당되는 모든 행정절차[설계 심의, 계약심사, 건축물에너지효율등급 예비인증, 장애물 없는 생활환경 예비인증 등〕이행 후 반영될 사항은 최종성과품에 반영하여야 한다.

3) 본 용역 설계진행 중 각 분야별(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경)로 사전 협조하여 용역 성과품 품질향상을 위한 중간검토를 받아야 한다.

4) 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 전문분야는 등록된 국가기술자격법에 의한 해당분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

5) 본 과업을 수행함에 있어 본 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관와 협의하여 수행한다.

6) 건축 협의(실시계획인가) 등에 대한 사항은 실시계획인가(변경)등 타법에 의한 인허가 사항이 별도로 수반할 경우 발주청에서 별도의 용역으로 해당업무를 수행하고, 건축설계자(건축사)는 이에 협조한다.

7)「건축법시행령」제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따른 관계기술자의 협력을 받아야 한다.

8) 본 용역 수행 중 필요 시 자문 또는 협의에 응하여야 하며, 협의 및 요청 내용에 대한 설계 반영사항을 날인 후 문서화하여 발주기관에 제출하여야 한다.

※ 자문 및 협의에 소요되는 모든 제비용은 용역수행자 부담으로 한다.

9) 본 과업의 시설물 특성상 각 시설별 특성을 감안하여 친환경 에너지 절약, 흡․배기 및 냉․난방시설, 화재 시 내화시간과 피난의 중요성을 인지하고 관련업체와 협력하여 설계에 반영해야 한다.

10) 실시설계자는 ‘공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토부 훈령 제1140호, 2019.1.1. 제정,  2019.3.1. 시행)’제4조 제1항에 의거 공사기간에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 고려하여 공사기간의 산정 및 산출근거를 설계 성과품의 일부로 제출하도록 하여야 한다.

11)「건설기술진흥법 시행령」제75조의2에 따라 해당시 설계의 안전성 검토를 수행하여야 함

-「건설공사 안전관리 업무수행 지침」제2장(건설공사 참여자 안전관리업무)에 따라 설계  안전성 검토 보고서를 작성하고, 성과품(설계안전 검토보고서, 시공 시 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항)을 제출하여야 한다.

12) 건축 인허가 및 착공신고 지원

13) 상세시공도서 작성

14) 조감도(A2) 작성

15) 건축물에너지효율등급 예비인증(1등급)

16) 에너지절약계획서 검토

17) 신재생 설계 (태양광 우선 설치)

※ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에 따른 공공기관 신축 건축물에 대한      신재생에너지 설치 의무비율 준수

18) 건축법 48조(구조내력 등), 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 등 내진 관련사항 검토

제2장  과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 설계자는 기본 및 실시설계 진행 시 다음 서류를 제출하여야 한다.

1) 착수계 1부(공문 포함)

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부

5) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

6) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

7) 설계용역 예정공정표 1부

※ 설계과업일정에 맞게 예정공정표를 작성하여 승인을 득하여야 하며, 예정공정표에는 각 분야별 수행계획 및 검수일을 포함하여야 한다.

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준으로 작성하고 분담 이행비율에 따라 분야별 용역수행 내역서 포함 제출

9) 하도급 예정 현황 1부(하도급 승인요청은 착수 후 20일 이내 제출)

10) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

11) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 설계자는 착수계 제출후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 착수회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 설계자는 예정공정표에 따라 계획설계에 대하여 감독관과 사전 협의, 승인을 받아 계획설계보고회를 거쳐 수정, 보완한 후 아래의 계획설계도서를 납품한다.

1) 배치, 평면, 입면(안) 1개 이상 제출

2) 각 제출도서는 1개 이상 제출

3) 세부제출도서는 제5장 납품목록을 참조

4) 관련법규 검토서

5) 현장조사 결과보고서

6) 관련서류 포함한 저장매체

7) 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

8) 계획설계 체크리스트

9) 계획설계 검사원

10) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 설계자는 예정공정표에 따라 중간설계에 대하여 감독관과 사전 협의, 승인을 받아 중간설계보고회를 거쳐 수정, 보완한 후 아래의 중간설계도서를 납품한다.

1) 중간설계검사원[붙임 3]

2) 세부제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 중간설계도서

4) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서

5) 건축물 에너지 효율 취득관련 검토서 및 자료

6) 공사별 예상 공정표(공기산출 근거 포함)

7) 예산 초과 시 절감방안 검토서

8) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

9) 관련 서류를 포함한 저장매체

마. 수급인은 예정공정표에 따라 실시설계에 대하여 감독관과 사전 협의, 승인을 받아 실시설계보고회를 거쳐 수정, 보완한 후 아래의 실시설계 도서를 납품한다.

1) 실시설계검사원[붙임 3]

2) 세부제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체

※ 도면, 내역서, 계산서, 물량산출서, 단가산출서, 2개 이상 비교견적

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 종결보고서

6) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료 포함)

7) 설계검사원

8) 건축물에너지효율 예비인증서

9) 손해배상보험증권(보증기간은 공사준공일까지 산정)

10) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

11) 설계안에 대한 조감도(실내 포함/ A2, 표구포함)

12) 관련 서류 포함한 저장매체

바. 기타서류

1) 용역의 진도보고 : 주간공정보고[붙임 4] 및 월간공정보고[붙임 5]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

<수급인은 설계진행 시 정기적으로 실시설계 진행사항을 보고하여야 한다.>

가. 업무보고

1) 주.월간공정보고 : 매주.월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 서식에 따라 제출한다.

2) 수시보고 : 설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생시마다 제출하여야 한다.

3) 발주처 요청보고 : 발주처에서 필요한 부분(주간공정 및 공사공법등) 보고 요청 시 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 기본 및 실시설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침 및 과업설명서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 설계지침 및 과업설명서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 설계자는 각종 회의시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석 범위 등을 협의하여 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적, 보완, 수정 요구사항에 대하여 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 기타회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 각종 자문회의*를 개최할 수 있으며, 이때 설계자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

* 본 사업은 서천군 공공건축가 또는 충청남도 공공건축가가 배치된 사업으로 과업 수행시 공공건축가가 참여하여 자문할 수 있으며, 자문 의견을 적극 검토하여 반영될 수 있도록 노력하여야 한다.

나) 실시설계 진행 시 문제점이 발생하거나 기본(계획·중간)설계, 실시설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작성·배부하여야 한다.

다) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

4) 업무보고 및 회의내용의 기록 : 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 설계에 사용하는 재료

가.「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 따른 고효율에너지기자재를 사용한다.

나. 인체에 유해한 물질이 함유된 자재는 사용을 할 수 없으며, 가능한 친환경자재의 사용을 고려한다.

다. 관급자재의 선정

1)「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제83조 및「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제86조와「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제11조에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정·고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매 규정에 따라 관급자재를 선정하여야 한다.

** 녹색 건설자재 직접구매 대상품목 지정내역 고시 포함 ('저탄소 녹색성장 기본법 시행령'제20조에 따른 조달청 고시)

2) 설계자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재 LIST 및 관급자재 선정 검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

3) 설계자는 관급자재 선정심의에 필요한 자료 작성시 수요기관 검토 담당자와 긴밀히 협조하여 관급자재 선정 심의 운영에 적극 협조하여야 한다.

라. 제품선정에 있어 부득이하게 신기술 및 특허 등의 특정제품이나 공법을 사용하여야 할 경우, 유사 제품을 조사하여 비교, 검토하고 제품선정 사유를 작성하여 발주청의 사전  승인을 받아야 한다.

※ 특정제품이나 공법 사용(적용)시 사전에 별도의 절차를 거쳐야 하며, 임의로 특정제품이나 공법을 설계에 반영하여 설계도서의 재작성 등에 따른 용역 지연 등은 설계자에게 책임이 있음.

4. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정

2) 건축물의 에너지절약 설계기준

3) 건축물 에너지효율등급 인증 기준

4) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. ‘건축물의 에너지절약 설계기준’에 따라 설계하여야 한다.

다. 건축물 에너지효율(1++등급 이상), 제로에너지건축물(4등급 이상) 예비인증을 취득하여야 한다.

라. 설계시 창호 주변에는 열교차단재 등을 반영하여 단열 효과를 높여야 한다.

5. 보안성 검토

가. 설계자는 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 설계자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.

* 착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

제3장  과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업은 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술 진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 공간정보관리법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통정비촉진법, 지자체 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령, 고시, 지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

나. 상기 기준의 제24조(설계도서 작성기준)는 건설공사의 설계도서 작성기준에 의거하여 작성한다.

다. 본 과업은 「건축구조기준」에 따라 내진설계를 수행한다.

라. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 할 경우 용역계약일반조건에 의거 지연배상금 조치를 하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량 누락, 보완설계가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계상의 하자 내용이 보완될 때까지 설계자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계 과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 설계 용역비 정산

- 당초 설계용역비 산출 때보다 면적이 감소될 경우 및 착오로 인한 과다 계상이 발견될 때에는 계약된 용역비를 감액 조치할 수 있으며, 이에 대하여 건축사는 이의를 제기할 수 없다. 단, 설계용역시행시 당초 면적보다 과다하게 증가가 발생한 경우(지하 주차장 신설에 따른 면적 증가 제외)에는 계약담당 공무원에게 계약금액 변경요청을 문서로 시행하였을 경우에 한하여 인정되며 합의 이행 후 계약을 변경하여야 한다.

2. 설계일반지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응하여야 한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안전성과 조형미를 살리면서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물 및 지형과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 본 사업부지 주변 현황을 고려하여 안전성 있고 기존 건축물과 조화롭게 설계하여야 한다.

4) 도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

사. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지를 반영한다.

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷, 전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, Pit 등 부식 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

아. 대지주변이나 건축물 내 소음원이 있는 경우에는 소음에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

자. 에너지절약형 설계

1) 창호, 내·외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2017-881호)에 적합하도록 설계하여야 한다.

2) 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자 · 공급자 등의 책무), 산업통상자원부 고시 ‘고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정’ 및 ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’에 의하여 고효율 자재사용 및 고효율시스템으로 설계하여야 한다.

3) 사무환경을 최적화하여 이용자 및 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

4) 신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급촉진법, 신‧재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2019-300호)에 의한 신‧재생에너지 설비를 반영

5) 설계시 LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감 방안을 마련하여 계획하여야 한다.

6) 건축물의 지속가능성 제고 차원에서 자연채광 및 자연통풍이 가능한 실로 최대한 배치하고, 에너지절약 및 유지관리를 고려한 창호계획을 하도록 하여야 한다.

차. 국토교통부 고시 제2019-394호 ‘범죄예방 건축기준 고시’를 준용할 것

1) 시설 내부에서 외부 보행동선을 쉽게 관찰할 수 있도록 설계

2) 시설 입구에 CCTV, 보안등, 비상벨 역할을 하는 슈퍼 보안 등 도입

3) 은폐장소 최소화, 자연감시를 위한 개방형 공간조성, 야간 가시성 극대화

4) 자연적 감시가 용이한 외부공간을 조성하고 수목에 의한 사각지대가 생기지 않도록 유의

카. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며 안전한 구조로 설계한다.

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조 안정성이 확보된 설계를 한다.

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계를 한다.

타. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재를 사용한다.

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 건축물의 요구성능 만족을 위해 부득이하게 특정자재를 사용하게 될 경우에는 특정자재 사용목록을 작성하여 승인을 받아야 한다.

* 특정자재 사용목록은 관급자재 선정검토서 제출시에 별도 제출

파. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사 및 이와 유사한 작업

나) 기계설비, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

다) 건설공사의 수량 및 견적업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 기타 발주기관에서 하도급이 필요하다고 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

가) 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는자

나) 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한자

* 하도급거래공정화에 관한 법률 제2조 제9항

4) 수급인은 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.

5) 수급인은 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 수급인은 하도급된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

6) 책임한계 : 하도급으로 시행한 설계성과에 대하여는 전적으로 수급인의 책임으로 한다.

3. 설계 기본방향

가. 설계 기본방향

1) 본 과업설명서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 과업설명서를 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 수급자 임의로 판단해서는 안되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

2) 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 소방, 통신공사 등에 대한 설계는 관련법령에 의한 제반규정이 정하는 기준 이상으로 한다.

3) 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

가) 사업부지 주변 현황을 고려하여 안정성 있고 주변의 건물과 조화롭게 설계하며 서천군 건축경관 조성을 위한 설계 디자인을 고려해야 한다.

나) 건축물의 주 방향은 채광 및 통풍을 고려하여 남향으로 배치하도록 고려한다.

다) 외부공간 계획시 접근성을 고려하여 보행로 및 진입공간을 조성할 것.

라) 인접한 도로접근로의 교통량 및 이용자 추이를 분석하여 차량과 보행자 동선을 고려한 합리적 진·출입 동선 및 주차계획을 반영하여 설계한다.

마) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

바) 수급자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사 시 도로의 연결관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

사) 색채계획은 공간기능·색의 물리·시각·심리적 영향을 정확하고 신중하게 고려하여 계획되어야 하며, 디자인 전 과정에서 형태·공간·구조·재료 요소를 동시에 고려하여 설계되어야 한다.

아) 건출물로의 출입동선, 건축물과 외부 옥외공간의 동선, 보차도와 옥외공간의 동선

연결은 장애물 없는 생활환경(BF)의 조건을 만족할 수 있도록 설계되어야 한다.

자) 가공센터로서 물품의 재료 및 최종 생산물품의 상하차를 위한 하역공간을 확보하여 계획한다.

나. 일반사항

1) 효율적인 공간계획, 시설배치를 통해 쾌적한 환경을 조성하고 친환경 건물로 제공될 수 있도록 설계한다.

2) 이용자의 특성을 파악하여 편의성 및 쾌적성을 배려하고, 관리자의 관리가 용이하도록 계획한다.

3) 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

4) 대지의 주변환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 배치되어야 하며, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

5) 건축, 토목, 기계설비, 전기, 소방, 통신, 조경 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 발휘에 적합하고 상호 연관성 및 효율성이 보장되어야 하며, 설계‧시공 및 유지관리상의 각종 자료를 검토하여 설계에 반영

6) 사업시행부지의 도시계획 및 관련법규와 관할 행정청의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인하여 설계에 반영

7) 설계도서는 관계법령에 의한 인‧허가 취득에 문제가 없도록 작성되어야 한다.

8) 건축물에 필요한 에너지부하를 최소화하고, 신‧재생에너지 등을 활용하여 에너지 소요량을 최소화 하는 등 제로에너지건축물 인증에 맞게 설계하여야 한다.

9) 재해 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 설계하여야 한다.

10) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관에 질의‧접수를 통해 해결하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따른다.

11) 건축계획은 다음과 같은 사항을 고려하여 계획한다.

가) 기본개념

- 이용 및 사용에 편리하고 서천군 공유농업가공센터의 특성을 상징할 수 있는 시설계획

나) 기본방향

1) 건축물 기본방향

- 동선의 집중화 및 단순화

- 에너지 절약형으로 유지관리 측면 경제성 고려

- 에너지 효율을 높이고 오염물질 배출을 최소화하여 환경과 친숙해지는 녹색 소방 실천

- 현대화된 미래 지향적 설계

- 발주처에서 제시한 Space Program, 구조 안전에 적합하도록 반영하고 완벽한 방수가 되도록 계획한다.(옥상바닥, 지붕 등 포함)

• 배치계획

- 사업부지 주변 현황을 고려하여 안정성 있고 주변의 건물과 조화롭게 설계

- 외부공간과 건축물과의 유기적인 연계 및 연결성 확보

- 건물은 미적이며 견고성을 유지할수 있도록 설계되어야 하며, 주위 환경을           최대한으로 보호 이용할 수 있어야 한다.

- 법정 건폐율 60%이내에서 층별로 다양한 공간 구성이 가능하도록 배치계획

- 추후 라이브러리등 증축을 고려하여 증축공간을 확보하여 배치계획

- 대지안의 공지 기준에 따라 건축선에서 3m, 인접대지경계선에서 1m 이상 이격

• 동선계획

- 전체 부지에 대한 동선을 종합적으로 검토하여 설계자가 합리적인 동선계획 제시

- 보행자와 차량접근을 분리하고, 보행자 안전을 우선 확보하고 보행 동선이 차량 동선에 간섭되지 않도록 방문객의 접근 편의성을 고려하여 계획

- 주차공간으로부터 안전하게 건물 주출입구로 접근 가능하도록 진입동선을 계획

- 화재·비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선 고려

- 실내 동선은 단순화하고, 각 출입시설에 대한 통제가 용이하도록 계획

- 가공영역에는 하역공간을 계획하고, 일반주차동선과 보행자와 분리하여 계획

• 외부공간계획

- 공개공지 또는 옥외 휴게공간 등 오픈스페이스를 확보하여 범죄예방환경설계 (CPTED)를 고려한 외부공간계획

- 건물 출입구와 인접하여 교통약자를 위한 주차공간을 고려하여 계획

- 조경, 보행로, 오픈스페이스, 옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 벤치 등)의 유니버셜 디자인을 접목한 통일성․일관성을 고려해서 계획

• 조닝계획

- 가공영역과 관리영역은 이용자와 공간 특성이 다르므로 기능 분리 및 연계를 위한 조닝(Zoning)계획을 우선 고려할 것

- 필요 시 시설별 출입구 및 이동 동선을 구분하여 계획

- 각 실별 기능적 특성에 따라 인접배치가 필요한 실과 직접 동선으로 연계되도록 계획

- 층수 및 층별 세부시설을 제시하기보다는 시설 연면적 범위 내에서 합리적인 조닝계획을 통해 세부시설을 배치계획

- 전체 연면적의 허용범위(±2-3%) 계획

- 건폐율 60%의 범위에서 각층 바닥면적을 자유롭게 산정하여 층별 실의 구성은 유연   성 있게 계획(단층으로 계획 가능)

- 주요 실별 요건(要件)을 명확하게 제시하고 필요한 설비(수전, 온습도 유지, 오폐수  처리 등), 장비 제원, 서비스동선 별도 확보 여부, 시설 간 이격 또는 근접 배치 여부  등 상세히 계획

• 주요 실별 계획

- 가공 및 포장 작업장은 안전에 유의하여 마감재를 선택하여 계획

- 휴게공간은 가공영역에서 주로 이용할 수 있도록 계획하며, 야외 휴게공간을 연계할  수 있도록 계획

- 적정한 공유면적(홀, 로비 등)을 확보하고, 장애물없는 생활환경을 기준으로 공유공간 확보와 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간계획 부대시설 확보(창고 등)

4. 설계진행 시 유의사항

가. 설계자는 신‧재생에너지 사용(태양광 등)에 대하여 설비 설치계획서를 작성하여 한국에너지공단에 제출하고 검토승인을 받아 실시설계에 반영하여야 하며, 발급받은 검토결과서를 제출하여야 한다.

나. 설계자는 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설 방안을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

다. 설계자는 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

라. 지질(지반)조사 보고서는 발주처가 제공한다.

마. 설계자는 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련 내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

바. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 기본 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토하여 반영한다.

사. 수급인은 「건설현장 축중기 설치지침(국토교통부 훈령)」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

아. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 등 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되, 지하수 유무 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

자. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

차. 본 사업과 관련 특별히 고려하고 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구사항에 대하여 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

카. 수급인은 각 분야별(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방) 실시설계 도서를 종합적으로 검토하여 향후 시공시 분야별 도면 상이로 인한 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

5. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등)

단, 발주단위에 대하여는 필요시 작성전 발주기관과 협의하여 결정한다.

나. 건축폐기물처리도서는 분리발주가 가능하도록 작성하여야 한다.

6. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약 일반조건에 의한다.

나. 약어를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M(소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E(전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

7. 도면작성

가. 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등) 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

바. 각종표시

1) 마감재료의 표시

마감재료는 해당 자료를 “□□□□”표로 인출하여 부재명, 재료명, 규격, 마무리 색채 처리순으로 표시함을 원칙으로 하며, 재료 규격의 크기는 길이 X, 폭Y, 두께Z 순으로 한다.

2) 재료 안면표기

재료 안면표기는 건축, 토목, 기계, 전기재료 등 규정에 준하되 통일을 기하여야 한다.

3) 단면위치 표시는 다음 보기의 요령을 작도한다.

가) 단면을 표시하는 경우

B

□□□□□□□□      □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 도면 단면표시

A ― 21

나) 입면 또는 전개도를 표시한다.

C

□□□□□□□□      □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 도면 단면표시

B ― 21

다) 부분 상세기호

B

□□□□□□□□      일련번호

A ― 21

라) 단면의 위치를 확인할 수 있도록 실명을 기입한다.

마) 도면 각장마다 설계사(기술사)의 실명을 기입하고 날인한다.

사. 상세통일

본 공사의 설계는 주위 환경에 부합되도록 통일성 있게 처리하여야 하며, 각종 상세부분의 표준안을 사전에 협의한 후 본 설계도면을 작성한다.

8. 기타 유의사항

가. 각 설계도서는 더 이상의 세부 설계가 없도록 최대한 상세히 표현하도록 분야별로 구분 작성한다.

나. 각 설계도서는 제반 법규에 적합하게 작성한다.

다. 건축, 토목 등 각 분야는 서로 상충되는 부분이 없도록 충분한 협의를 거쳐 설계한다.

라. 용역자는 설계내용 및 자료에 대한 보안조치를 하여야 한다.

마. 설계용역에 필요한 문의나 건의할 사항이 발생되었을 때는 임명한 감독관과 협의하여야 한다.

바. 기타 과업지침서에 명기하지 아니한 사항은 각 감독관 및 검수관과 협의하여 처리한다.

제4장  분야별 과업내용서

1. 건축분야 과업내용서

【기 본 설 계】

1. 과업의 범위

“기본설계”라 함은 기본계획을 감안하여 시설물의 규모, 배치, 형태, 개략공사 방법 및 기간, 개략 공사비 등에 관한 조사, 분석, 비교·검토를 거쳐 최적안을 선정하고 이를 설계도서로 표현하여 제시하는 설계업무로서 각종 사업의 인·허가를 위한 설계를 포함하며, 설계기준 및 조건 등 실시설계용역에 필요한 기술자료를 작성하는 것을 말한다.

2. 관계법규 조사

설계용역자는 본 설계와 관련한 제반 법규에 적합하게 설계하여야 하며, 면밀한 사전조사 후에 설계한다.

가. 대지의 여건조사

1) 지형조사 : 우천 시(호우) 유수의 흐름이 계획대지에 지장되는지 유무를 판단한다.

2) 교통현황조사

가) 대지 주변지역 교통현황(도로, 교차로, 보도, 차량 및 보행교통량 등)파악,

자재 반출‧입, 각종 공사용 장비, 잔토처리, 성토 등 교통 제반문제 조사

나) 주차계획 반영, 도로 및 보도, 가로시설물 계획

3) 도시계획 관련조사

4) 하수도 및 오수관계 조사

5) 상수도 인입 및 급수량 조사

6) 지하 매설물 조사

7) 도시가스 인입 조사

8) 전기 인입 및 용량조사

9) 기존옹벽 등 대지주변 구조물 조사

나. 지반조사 및 토질시험(발주기관 사전정보 제공 또는 별도 발주 시 생략/필요시 진행)

1) 지반조사 시 인근지역의 기존 지반조사 자료를 포함한 사전 개략조사를 통하여 지반특성을 예비적으로 평가, 지반조사 계획에 활용한다.

2) 시추간격 및 조사 위치는 용역감독자 승인을 득하여 시행한다.

3) 지반조사(보링) 수량의 경우 최소 3공 이상으로 하며, 증감이 필요할 경우 발주기관과 협의하여야 한다.

4) 지반조사는 표준관입시험, 탄성파시험을 병행하며, 시추공은 NX 규격으로 시행한다.

5) 지반보고서에는 표준관입시험, 탄성파 탐사, 기초형식 및 지내력, 지하수위측정, 전단파 속도 측정 등이 명기 되어야 한다.

6) 시추심도는 건축대상인 지하1층 아래에서부터 지지층(풍화암 5m이상 혹은 연암 2m이상)을 확인할 수 있도록 하고, 표준관입시험은 1.5m 실시하며, 조사가 완료된 시추공에 대해서는 관련 기준에 맞게 폐공처리토록 한다.

7) 시추조사 결과 설계자문위원회 등에서 지하구조물 계획에 영향을 줄 정도로 지반의변동이 심하다고 판정될 경우 추가 보링조사를 실시하여야 한다.

8) 토질시험은 시료채취가 가능한 시료(자연시료)에 대하여 실시하며, 시험의 목적을 명확히 파악한 후 시험[표준관입시험, 실내토질시험(물리시험, 역학적 시험), 평판재하시험]을 실시하여야 한다.

9) 시추공으로 인한 지하수의 오염물질 유입 등의 발생요인이 있을 경우에는 폐공 되메우기 등의 조치를 하여야 한다.

다. 현황측량

1) 기준점 및 수준점은 공공측량의 작업규정에 의해 시행한다.

2) 도근점 위치는 향후 공사 시 확인할 수 있는 위치에 설치하며 야장에 기록하여 훼손 시 복원될 수 있도록 하여야 한다.

라. 공사용 가설동력 및 통신현황 조사

마. 잔토처리 및 성토 시 반입 토취장 관계 등

3. 기본설계 용역수행

가. 설계자는 각종 심사, 자문, 심의 및 협의내용을 설계에 반영하여야 하며, 각종 공법에 대하여 발주기관과 충분히 검토한 후 결정하여야 한다.

나. 기본설계는 기본개념이 설계도서에 구체적으로 표현되어야 하므로 실현 불가능하거나 관련 법규에 저촉되어 공사시행이 불가능한 내용이 되어서는 안 되며, 각종 조사를 실시하여 그 결과를 기본설계에 반영하여야 한다.

다. 검토내용

1) 계획(안)에 대해 발주기관과 견해를 달리할 때에는 타당성 등을 검토하여 우리 군과 협의하고 설계에 반영하여야 한다.

2) 주변 환경과 조화된 배치계획, 건물의 특성 및 주변경관을 고려한 입면계획, 시설의이용에 편리한 평면계획, 주차계획을 수립하여 설계하고 개략공사비를 산정 각종 심의자료를 작성하여야 한다.

3) 건축물의 구조계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리, 에너지절약 등을 종합적으로 고려한 합리적인 설계가 되도록 한다.

4) 부지 주변의 도로 및 건축물을 감안하여 토목 설계 시 충분한 안전성과 구조물 지내력 등을 확보할 수 있도록 설계한다.

5) 건축개념과 건축 재료는 친환경적인 개념과 재료를 도입․선정되도록 하고, 건물 내․외장 색채계획을 수립하여 수행하도록 한다.

6) 내․외장 마감자재는 경제적이고 내구성이 우수하며 유지관리 면에서 유리한 질감, 색채 등 자연친화적인 자재를 선택하여야 한다.

7) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화되는 일이 없도록 설계한다.

8) 제반 부수시설의 가구, 사인보드, 특수시설 및 기구 등은 그 종류, 형태, 재료, 색채, 크기, 필요위치, 소요개수 등을 면밀하게 분석 및 검토하여 실시설계에 반영할 수 있도록 충분한 계획 및 자료를 제시한다.

9) 기존 도로 및 부대 시설물과 연계하여 가장 합리적이고 경제적으로 설계하여야 한다.

10) 시대적 추세에 맞추어 지속 가능성(환경, 건강, 안락) 측면에 대하여 검토 후 설계에 반영하여야 한다.

11) 외관은 인근에 위치한 건축물과 쉽게 구분할 수 있도록 구조, 배치등을 고려하여 설계한다.

12) 재활용 자재(보도블록 등) 사용 가능여부를 검토 후 설계에 반영한다.

13) 차량의 진‧출입 등 차량과 보행자의 통행빈도 등을 고려하여 동선을 합리적으로 계획한다.

14) 유니버셜 디자인으로 모든 사용자의 불편이 없도록 계획하여야 한다.

15) 재생에너지 이용을 위한 옥상계획 및 활용도 확대 필요

16) 장애인, 노약자 등을 위한 Barrier Free에 입각한 건축계획 필요

17) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

4. 설계도서 작성

가.「건축법」제2조 제14호, 동법 시행규칙 제2조의1 및 국토교통부고시 제2017-3호(‘16.12.30.) 설계도서 작성기준에 따른 도서

나. 과업지시서 상 과업내용에 따른 각종 도서

다. 기타 필요한 도서(입면도는 4면 작성 : 전‧후‧좌‧우측면도, 단면도는 종단면도 2면이상, 횡단면도, 주계단 단면도, 외벽단면상세도 등)

5. 개략공사비 산출

공종별 공사비(공종별 개략 물량 포함) 개략계산은 신빙성 있는 자료를 근거로 하여 실제 소요 공사비의 근사치가 되어야 하며, 공사비산출은 아래와 같은 규정이 정해져 있는 것은 그 규정에 따르고 그렇지 못한 것은 관련 계산근거 및 관련 자료를 함께 제출하여야 한다.

가. 공사비 계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가 계산에 의해 작성하여야 한다.

나. 공사비 적산은 표준품셈, 시중노임단가, 적산기준 및 조달가격 고시 등을 참고하여 작성하여야 한다.

다. 특수공정은 제조원가 계산서 양식에 따른 서식으로 3개소 이상의 견적서를 받아 합리적인 단가를 택한다.

라. 제조원가에 의할 수 없는 공정의 단가는 전문가의 견적단가로 계산한다.

6. 공사 공정표

가. 각 공종별로 단일화 시켜야 하며, 이 공종들의 상관관계를 경로와 날짜가 나타나도록 공정표를 작성한다.(공정을 월별, 누계치를 표시)

나. 특수공정은 작업의 시작과 종료 시점에서 선행되어야 하는 작업명칭을 기입하여야 한다.

다. 총 공정 일정은 실제 공사시행에 적용할 수 있는 자연적, 지리적, 인위적 요소가 감안된 일정이어야 하며, 휴일은 일정에 산입한다.

라. 공사 공정표는「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 의하여 해 산출된 공사기간의 내용을 반영하여 작성한다.

※ 공사예정공정표 : 우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 군민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 시공전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

7. 설계설명서 등

가. 각 시설별로 설계에 따른 설명서를 작성한다.

나. 본 과업내용서에서 제시하는 기본설계에 관한 모든 사항에 대하여 종합적으로 각 공종별로 정리하여 작성한다.

다. 작성언어는 한글로 하고 단위는 미터법을 기준으로 한다.

라. 기타사항, 필요사항, 특기사항에 대하여 설명서를 작성한다.

마. 우리 군 요구사항 등을 포함하여 작성한다.

8. 성과품 제출

가. 기본설계종합보고서 및 설명서 : 각 3부

나. 설계도면(A3책자형) : 각 3부 (CD ROM 또는 USB 별도 1매)

다. 개략공사비 내역서 : 각 3부 (CD ROM 또는 USB 별도 1매)

라. 개략적인 부하계산서 등 각종 계산서 : 각 3부(CD ROM 또는 USB 별도 1매)

마. 구조계산서 : 각 1부(CD ROM 또는 USB 별도 1매)

바. 공사기간의 산정 및 산출근거 3부

사. 기타 발주기관에서 요구하는 성과품 1식

[실 시 설 계]

1. 과업의 범위

실시설계는 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 이 도서는 실시설계 완료 전에 각종 협의, 심의 및 인‧허가 등 행정절차를 거쳐 확정한다.

2. 설계도서 작성기준

가. 기본설계에서 결정된 각종 시설의 형식 및 기준을 재검토하여 보고 후 최종 확정안에 대하여 세부 실시 설계도서를 작성한다.

나. 설계도서 작성

1) 설계도서 작성은 우리 군이 지정하는 규격으로 한다.

2) 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

3) 설계도면은 범례, 도면목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 용량, 기타 사항을 표기한 일람표를 표기하여야 한다.

4) 각 설계도는 관련 법규 및 발주기관의 공사시행 과정을 참조하여 분야별로 구분 설계하여야 한다.

5)「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」및「녹색제품 구매지침(환경부)」에 따라 마감재 계획에 친환경자재를 사용하여야 한다.

다. 각 분야별 법규 및 규정, 기준에 적합할 것

1) 건축분야

가) 건축법 및 건축 관계 법령, 건설산업기본법 및 건설관계법령 기준

나) 건축구조설계기준(KDS 41)에에 따른 구조기준 및 하중 적용

다) 기타 본 용역에 적용되어야 할 관련 기준 등

2) 토목분야

가) 부지조성 계획 및 설계

나) 기초공사 계획 및 설계

다) 구조물 계획 및 설계

라) 포장설계 등

(1) 포장설계는 토질․기후․골재․교통량 등에 관한 조사서 결과의 기초 자료에 따라 설계한다.

(2) 포장구조는 콘크리트의 아스팔트 포장의 경제성․시공성․수명․유지관리 등을 비교 검토하여 설계하여야 한다.

3. 설계 설명서

가. 설계 설명서는 본 과업의 전체 순위를 정하여 아래와 같이 알아보기 쉽게 하여야 한다.

1) 개요

2) 구조 및 면적

3) 부지정지 및 토목공사, 부대시설

4) 상․하수도 시설

5) 기타 필요한 사항 등

나. 설계 설명서에는 설계조건 적용 등 특수사항을 표기하여야 한다.

다. 세부시설 설명서는 각 시설별로 한 장 단위로 시설개요․면적․규모․층고․일반 및 특수시설 내용 등 전반에 걸쳐 기술하고, 그 실의 기능․용도․설치목적 등을 표기하여 실제 사용자에게 시설물 이용에 편리하도록 기준이 되는 근거가 되도록 작성한다.

라. 기타 세부도면 작성 및 분류는 발주기관과 협의하여 작성한다.

마. 건설안전을 고려한 설계(DFS, Design For Safety)를 한다.

1) 설계에서 가정한 시공법 및 절차에 의해 발생하는 위험요소가 회피, 제거, 감소되도록 한다.

2) 시공단계에서 설치되는 가설 시설물의 안전한 설치 및 해체를 고려해야 한다.

3) 깊은 지하 굴착을 최대한 배제하여야 한다.

4) 위험장소에서의 작업을 최소화하기 위해 공장제작 자재의 활용을 적극적으로 고려한다.

5) 동일 작업장소에서 시공절차가 충돌되지 않고 안전하게 작업이 이루어지도록 해야 한다.

6) 시설물의 유지관리가 용이하도록 개․보수 및 청소를 위한 전용통로, 설비의 설치 및 제거가 용이한 반입구 등이 고려되어야 한다.

7) 부서지기 쉬운 자재가 최소화되도록 하여야 하며, 석면 및 석면이 함유된 자재가 사용되지  않도록 하여야 한다.

8) 해체 및 개․보수 공사 시 기존 구조물이 안전하도록 하여야 한다.

9) 지반굴착공사의 시공시기가 장마철, 해빙기와 겹칠 경우에는 이에 대한 안전성 검토를      실시하여야 한다.

10) 건설공사 중 근로자의 안전확보를 위하여「산업안전보건법」제23조부터 24조까지에서 정하는 내용을 고려해야 한다.

4. 시방서

가. 공사 시방서 : 공사시방서는 공종별 분류하여 세부적으로 작성하며, 발주처와 상의하여 설계에 반영한 내용을 참고하여 작성한다.

나. 전문 시방서 : 특정 공종관련 특정 제품의 시공에 관한 공사의 시공방법, 검사방법 등을 명시, 현장활용서 포함

다. 기자재 시방서 : 사용하고자 하는 기자재의 특성․운영방법․제작조건 및 기준 등을 명시

라. 공종․기기별 누락 없이 상세히 기록

마. 실시설계 시 작성되는 각 종류별 시방서에 ‘건설기술자’를 ‘건설기술인’으로 통일하여 명기할 것

바. 기타 우리 군 요구 시방서

5. 설계도면

가. 설계도면은 발주기관에서 지정하는 규격으로 설계함을 원칙으로 한다.

나. 건축설계의 도서는 KSA 0005 제도 통칙에 준하여 작성한다.

다. 과업시설물의 설계도서는 기관별, 공종별, 발주구분별로 편철하여 도서목차, 배치도, 구적도, 평면도, 단면도 등의 순서로 작성한다.

라. 도면 제작 중 중복이 있을 경우 단일화하거나 동일 도면에 표시할 수 있으며, 도면 규격과 설계도 축척이 맞지 않을 경우에는 일부수칙을 변경할 수 있다.

1) 국토해양부 고시 제2016-1025 호(’16.12.30) 설계도서 작성기준에 의한 도서

2) 기타 공사 시행에 필요한 도면(서천군의 구분 발주가 예상되는 공종은 별도 작성 요함)

3) 모든 도면은 전자화된 형태로 작성하되「건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 ‘건설CALS/EC 전자도면 작성 표준’에 따른다.

마. 토목분야 : 축척은 도면의 축소와 확대에 대응할 수 있도록 스케일자를 포함하도록 한다.

1) 평면과 종단은 동일 평면상에 평면을 상단에 종단을 하단에 작성한다.

2) 평면도 : 축척은 1:500으로 하고 등고선은 1m 간격으로 표시하되 곡선부에 곡선표를 도면에 표시하고 가 수준점 위치 및 골조측량에 따른 좌표(X,Y)도 동시에 표시하여야 한다.

3) 종단도 : 축척은 종(1:200)․횡(1:500)으로 구분하고 평면곡선 및 종단 곡선표를 표시하되 구조물의 규모 및 위치 등을 표시하고 가 수준점의 표고를 표시하여야 한다.

4) 횡단도 : 축척은 1:100으로 하고 중간측점 및 구조물의 시․종점의 횡단도를 필히 포함시켜야 한다.

5) 구조물도 : 구조물의 도면은 시공의 순서대로 각 부위별로 필요한 축척으로 세분하여야 한다.

6) 기타사항 : 우수·지하수 배제시설 계획에 대하여는 지반조사 및 수리검토 결과에  따라 우수 지하수 배제시설 계획을 작성하고, 기타 설계도에 수록되어야 한다고 인정되는 사항에 대하여 우리 군과 협의 작성한다.

바.「건설기술산업법」제42조에 따른 준공석 또는 준공판의 설계도가 작성되어야 한다.

6. 각종 계산서 등

본 과업에 관련된 구조 계산서 등 각 분야의 기술적 계산서는 건축법 등 관계 규정에서 정한 내용에 의거하여 관련 전문가가 작성하고, 반드시 작성자가 날인하여야 한다.

가. 수리 계산서

나. 배수시설 계산서

다. 구조 계산서

라. 기 타(지반조사 보고서 등)

7. 공사비 내역서

가. 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙의 공사원가계산 방식에 의거 작성 한다.

나. 공사비 적산은 정부표준품셈, 정부노임단가 등에 의거 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단을 하여 적산하여야 한다.

1) 재료 단가조사

가) 본 공사에 소요되는 모든 자재를 각 품목, 품질 및 규격별로 조사한다.

나) 자재단가는 조달청 발행 “가격정보”를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 대한건설협회 발행 “거래가격” 사단법인 한국물가협회 발행 “물가자료” 사단법인 한국물가정보 발행 “물가정보” 중 서로 비교하여 최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 때에는 시중 거래실제가격(3개 업체 이상 견적서 첨부)을 기준으로 한다. 단, 재료 및 자재단가 운반비가 포함되지 않는 경우 구입 장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

다) 사용자재는 국내 생산품 중 KS품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 명확히 밝히고 이에 대체할 수 있는 국내 제품과 비교 검토하여 우리 군과 협의하여 적용한다.

다. 실적공사비 적용이 가능한 공종에 대하여는 관련 규정을 적용한다.

1) 수량산출

가) 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합하도록 용역감독자와 협의 결정하여 적용한다.

나) 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 비교하여, 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교 채택하여 산정 한다.

다) 사용단위는 미터법 단위로 하되 소수점 이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

라) 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오 또는 오차가 없도록 하여야 한다.

2) 주요자재

가) 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

나) KS 제품에 없는 제품을 사용할 때에는 공사조건에 맞는 관련 규격 및 시방서(외국 규격 등) 등을 검토하여 사용토록 한다.

다) 주요자재는 회계예규 「지방자치단체 공사계약일반조건」제5절(공사계약의이행) 2.(공사자재의 검사) 및 3.(관급자재 및 대여품)“ 규정에 따라 운용‧관리하는데 지장이 없도록 설계도서를 작성하여야 한다.

라) 우리 군이 공급한 설계자료와 기타사항은 설계용역 수행을 위하여만 사용하고 잉여분은 우리 군의 지시에 따라 반납하여야 한다.

마) 우리 군의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전 물량파악이 있을 시는 즉시 물량 산출하여야 한다.

바) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제86조와「중소기업제품 구매촉진 및 판로 지원에 관한 법률 시행령」제11조에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정ㆍ고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매토록 규정하고 있으며,「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준(조달청 훈령 제2011-1516호,   2011.07.13. 제정)」에 따라 관급자재를 선정하여야 한다.

3) 일위대가표

정부표준품셈에 따라 작성하여야 하며, 현실에 부합되는 일위대가표를 작성하여야 한다. 또한 일위대가표 상 이의사항이 있을 경우 감독원과 반드시 협의하여야 한다.

4)「건설기술진흥법」제63조제1항에 따른 건설공사의 안전관리를 공사금액에 계상하여야 함

5)「건설기술진흥법」제56조에 따른 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상   하여야 함

라. 충청남도 또는 서천군 공사장 지하수관리 매뉴얼’(물순환정책과, 17.5.)에 따라 대상사업   여부를 확인하여 공사내역서 작성시 굴착공사에 따른 공사장 및 주변 계측 등 안전관리를 위한 관리비용 추가를 검토하고, 시방서에 있는 ‘공사장 지하수 관리 매뉴얼’을 준수한다.

마.「건설근로자 고용개선 등에 관한 법률 제7조의2」에 의거, 근로자 편의시설(화장실, 식당, 탈의실)을 설계(공종별 물량내역서 등)에 반영할 것

8. 공 정 표

가. 본 과업의 공사 공정표(CPM 네트워크 등)는 공사의 주요내용파악(주‧부 공정의 구분, 공종별 상호연계 및 충돌여부 등)이 용이하도록 상세하게 작성한다.

나. 특히, 시방서에 명시되어진 공종 중 우리 군이 지정하는 주요공정은 별도로 공정표를 작성한다.

다. 공사기간 산정은 국토교통부「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 의거 공사기간이 적정하게 산정될 수 있도록 한다.

9. 실시설계 종합보고서

가. 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고, 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각실 면적 및 기능과 시설개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하여야 한다.

나. 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서 이어야 하며,  다음 사항을 수록하여야 한다.

1) 과업의 목적

2) 과업의 범위 및 과업의 내용

3) 사전 조사내용 요약

4) 설계기준

5) 구조물 설계안별 검토내용

6) 세부설계내용 (공종별 비교검토 내역포함)

7) 주요자재 및 수급계획

8) 시공계획

9) 도면첨부

10) 기타 참고자료 및 우리 군의 요구사항

10. 성과품 제출

설계도면 및 시방서는 아래 제출서류 이외에 조달청에서 선정된 CD-ROM 저장프로그램으로 저장된 CD-ROM으로 제출하여야 하며, 내역서는 아래 제출서류 이외에 조달청에서 시설공사 응용프로그램으로 선정된 프로그램으로 작성된 CD-ROM으로 제출하여야 한다.

가. 설계용역 보고서 5부.

나. 설계도서 원도 및 원고일체

다. 설계도서

1) 설계설명서 5부

2) 설계도면 A3, 5부 (책자형)

3) 시방서 (공사, 전문, 기자재시방서 등) 5부

4) 수량산출 조서 5부

5) 단가산출 조서 5부

6) 설계내역서 5부

7) 설계도서는 각 분야별로 감독원 지시에 따라 작성 제출한다.

8) 공사기간의 산정 및 산출근거 5부

라.「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따른 설계안전 검토보고서 3부

마. 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야하는 위험요소, 위험성, 저감 대책에 관한 사항 3부

바. 각종 계산서 [구조계산서(CD포함) 등] : 3부

사. 조감도(60×90cm내외) 1점, 조감도 파일(jpg) CD

아. 기 타 : 제품의 카탈로그 취급설명서, 견적서, 참고자료 등

자. 기타 우리 군에서 요구하는 성과품과 설계내역서 중 단가 미기재 내역서의 수량은 별도 감독원의 지시에 의한다.

2. 토목분야 과업내용서

1. 일반사항

가. 수급인은 다음사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 주요 검토내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 관계기관(국토교통부 등)과의 협의사항

4) 시설부지의 설정 또는 변경

5) 기타 용역감독자의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

나. 관련 법령

1)「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙,「도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙」

2) 도로법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙, 도로와 다른 도로와의 연결에 관한 규칙

3) 하수도법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

4) 건설기술진흥법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

5) 건설산업기본법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

6) 폐기물관리법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

7) 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙

8) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

9) 기타 법령 등

다. 관련 훈령 및 지침 등

라. 각종 기준 및 시방서 등

2. 기본설계 용역수행

가. 일반사항

1) 계획범위는 건축공사의 부대토목공사에 해당하는 것을 말한다.

2) 기초조사를 시행함에 있어서는 향후 계획, 설계 및 시공을 고려하여 과학적이고 합리적으로 실시하되, 전체 공정의 기초가 되는 공종이므로 고도의 정밀성을 담보할 수 있도록 실시하여야 한다.

3) 기초조사는 토목분야의 모든 인자를 포함하여 광범위하게 실시하되, 계획 및 설계기준안의 작성에 충분한 근거를 제공할 수 있도록 실시하여야 한다.

나. 기본사항

1) 설계의 범위는 계획 대지 내이며, 건축공사를 위한 부대토목으로 계획하여야 한다.

2) 적용공법 등은 인근 사업지에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하여야 한다.

3) 하수의 배수방식, 계통, 방류위치 등을 결정하기 위해서는 배수시설 등을 조사하여 배수가 원활하도록 계획하고, 기존 배수시설이 없을 경우에는 별도로 계획하여 발주기관와 협의하여야 한다.

4) 주변 현황 및 상·하수도 계획 등을 고려하고 가능한 대지 내에서 절토, 성토(지반침하 등을 고려) 균형을 맞추며 부득이한 경우 반입토, 반출토를 계상할 수 있다.

5) 상수도 시설은 합리적인 계획으로 수요자에 질적으로 안정되고 양적으로 충분한 물을 공급하도록 계획하여야 한다.

6) 주변 지형여건과 부합되고 지반조사 결과를 고려하여 유지 및 관리에 편리한 경제적인 계획을 수립한다.

다. 기존자료 조사

1) 토질 및 지형, 주변의 기존 시설물의 설계자료를 조사하여 지반이나 토질의 상태를 간접조사 방법으로 추론하여 실시설계에 활용될 수 있도록 해야 한다.

2) 기타 부대토목분야에 대한 모든 자료를 활용하여야 한다.

라. 지장물 조사

1) 본 과업의 설계와 관련이 있는 지하매설물, 지상의 간섭 구조물, 건축물 등에 대하여 조사하여야 한다.

2) 조사한 주요 지장물들은 현황 및 계획평면도에 정확하게 표기하여야 한다.

3) 관련 기관과의 협의를 통하여 이설이 필요하거나 시공 시 보호공이 필요할 경우에는 이설비 등을 설계에 반영하여야 한다.

마. 기본계획

1) 수집된 기초자료를 분석, 문제점을 검토하여 합리적인 토목시공이 가능하도록 하기 위하여 토목시설의 실태와 지역여건 등에 맞도록 주요 항목별 기본방향을 제시하여야 한다.

2) 기 설치된 시설 이외의 장래 부지 내 포장 등을 고려하여 합리적인 설계가 이루어질 수 있도록 한다.

10. 실시설계

가. 일반지침

1) 지형현황측량, 도시계획결정, 인․허가 및 협의 시 관련 기관의 의견 등과 기 수립된 기본계획을 검토하여 기본․실시설계에 반영하여야 하며, 통계자료 적용 및 원단위 산출 등은 당해 지역 및 관련 기관의 통계치를 검토․분석하여 적용한다.

2) 공사비 산정은 국토교통부 제정 토목 표준시방서와 건설공사 표준품셈, 시중노임 단가를 기준으로 하되 최신자료를 활용하고, 가격조사는 「통계법」 제3조의 규정에 의한 통계작성 승인을 받은 기관이 조사 공포한 가격기준으로하며, 단위는 미터법으로 한다.

3) 설계예산서 작성은 기획재정부 제정 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙에 따라 작성하되, 제경비 산정은 용역감독자와 협의 결정한다.

4) 과업수행 내용 및 지침에 대하여는 수시로 용역감독자와 협의하여야 하며, 용역 감독자의 요구가 있을 때에는 용역관계자는 요구에 응하여야 한다.

5) 각 공종별 사용공법에 대하여 용역감독자와 충분한 협의를 거쳐 결정해야 하며, 특히 연약지반이 있을 경우 세밀히 검토하여 시공성, 안정성, 경제성이 있도록 합리적인 방안을 제시하여야 한다.

6) 실시설계 과업 수행 시 서천군의 설계심의 및 감사에 지적된 사항을 반드시 조사하여 실시설계에 반영하여야 한다.

나. 세부지침

1) 설계조건 검토

가) 본 과업 수행 시 설계기준 각종 규정 및 표준시방서를 기준으로 하되, 용역감독자와 협의 후 결정한다.

나) 제반 현황, 각종 시험결과, 현지여건 등을 면밀히 검토하여 실시설계기준을 수립하고, 용역감독자의 검토를 받아 이를 실시설계에 반영하여야 하며, 실시설계 착수 전에 이 설계기준(안)을 인쇄 제본하여 우리 군에 제출해야 한다.

다) 인접한 건축물 등에 대한 안전성과 공사 시의 영향조사를 반드시 검토하여 대책을 수립해야 한다.

2) 토공설계

가) 지반조성

(1) 지반선 및 건물 지반면은 계약상대자가 조사한 지반조사 결과 및 사전조사에 따라 기본설계 시 합리적 방법으로 계약상대자가 제시하여야 한다.

(2) 건축, 토목 및 기타 구조물 잔토를 지구 내에서 자체 균형을 이루도록 하고, 이를 고려하여 건물 및 대지조성 계획고를 조성하여야 하며, 교통혼잡 및 주변 환경에 악영향이 없도록 설계하여야 하며, 구조물 설치를 최소화해야 한다.

(3) 토공에 있어 토량환산계수 및 흙의 단위중량은 토질조사 및 시험결과에 따라 적용하여 설계하며, 사토 또는 성토에 대하여 경제적인 설계가 되도록 한다.

(5) 토공사시 기존 기반시설, 기타 지하매설물과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계해야 하며, 해수의 오염이 최소가 되도록 하여야 한다.

(7) 성토 마운딩 처리는 자연적인 느낌이 나면서 조경설계에서 의도하는 바에 적합해야 한다.

나) 터파기

(1) 흙막이, 차수 및 지반보강공법 등은 경제적인 공법 및 신뢰성이 높은 방법으로 하여야 한다.

(2) 터파기 계획 수립 시 지하매설의 지장 유무를 사전에 확인하여 공사 시 손상이 가지 않도록 충분히 검토하여 계획한다.

다)우․오수공사

(1) 하수도분야 시설의 설계는 환경부 하수도 시설기준 등 하수도분야 상위계획과 적합성에 대한 사전 검토를 거쳐 설계에 반영하여야 한다.

(2) 우수공은 부지전체 우수구역의 우수량을 산정하여 배수가 최대한 용이하도록 우수계획을 수립하며, 서천군의 최대홍수 시나 태풍 시에도 침수피해가 발생하지 않도록 특별히 유의하여 설계토록 한다.

(3) 오수공은 부재 내에서 발생하는 오수량을 산정하여 부지 내의 오수처리에 있어 최적의 방안이 되도록 오수처리계획을 수립하여야 한다.

(4) 오수의 처리계통은 주변지역 계획과 연계하여 최적의 관망을 설계하여야 한다.

(5) 우수량 산정방식 : 우수 설계 시 우수량 산정은 합리식을 적용하며 유출계수는 부지이용계획에 따라 용도별 면적을 계산하며, 확률 강우강도는 20년

(6) 오, 우수방식 : 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

(7) 배수조건 및 부지구배는 지형조건을 고려하여 결정한다.

3. 기계분야 과업내용서

【기 본 설 계】

1. 기본방향

가. 건축, 전기 등 관련된 타 공사분야와 긴밀한 협조하여 건축물 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 한다.

나. 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 적응성이 있어야 한다.

다. Life Cycle Cost를 고려하여 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화할 수 있는 설비방식을 고려한다.

라. 자동제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율 극대화 및 인력절감을 기한다.

마. 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

바. 관계법령의 규정을 준수하여 설계서를 작성한다.

2. 관계법규 조사(해당분야 반영)

가. 소방법령 및 관련법규

나. 하수도법령 및 관련법규

다. 위험물안전관리법령 및 관련법규

라. 도시가스사업법령 및 관련법규

마. 주차장법령 및 관련법규

바. 에너지이용 합리화법령 및 관련법규

사. 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법

아. 실내 공기질 관리법규 및 관련사항

자. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

차. 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시)

카. 수도법령 및 관련법규 등

타. 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법규 및 관련사항

파. 한국산업규격

하. 기타 본 건축물 건립을 위한 제반 법규

3. 기본설계 용역수행

다음 소요시설에 대하여 검토하고 설계에 반영한다.

가. 냉․난방 공조 설비

1) 건축물 규모, 용도에 맞는 냉․난방방식 검토설계(차고지 난방포함)

2) 각 실별 부하조건 및 에너지 절약형 공조방식 검토설계

3) 기계실 장비 및 기기의 적정배치

4) 이용 인원을 감안하여 효과적인 공조방식 검토설계

5) 실별 특성에 따른 항온항습 및 클린룸 검토설계

나. 열원설비

유지관리비 절감과 효율적 운영을 위한 설비 및 신․재생에너지 검토 설계

다. 위생설비

1) 재질, 규격 선정 시 부식과 수압을 감안한 검토설계

2) 전기실, 변전실, 작업실 등을 통과하지 않도록 배관경로 검토설계

3) 절수형 위생기구 적용 및 배관 소음 최소화 가능한 자재 및 경로 검토설계

4) 겨울철 외기노출 배관의 동파 방지 및 영구 음영 부분에 대한 결빙대책을 반영해야 한다.

라. 소방설비

1) 화재발생 시 초기진압 능력 및 연기확산 최소화 계획

2) 유사 시 인명피해 최소화 및 건물의 안정성 강화

3) 각 실 및 용도별 소방설비 기준에 적합하게 설계

마. 환기설비

1) 대기실, 사무실, 기계실 등 실별 환기방법 검토설계

2) 환기방법을 에너지절약대책과 함께 검토설계

3) 실내유입 미세먼지를 줄이기 위한 기계환기장치 계획 및 공기여과성능(필터) 기준은 ‘충청남도 및 서천군 조례’ 를 준수

4) 환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며, 공조설비와 조화되도록 하고, 건축물에 적합한 환기설비를 계획

바. 자동제어 및 중앙감시설비, 기계, 전기 등 통합 감시제어방식 검토설계

사. 급․배수 설비

1) 급수방식은 직수, 부스터펌프, 고가수조 방식 등 종합적으로 검토설계

2) 급수관 인입에 따른 도로굴착 및 분담금사항 등 관할 맑은물사업소와 사전 협의 검토설계(상수도 공급가능 협의 등)

3) 급․배수관로는 주요 작업실의 통과를 피하고 배수관은 방음 재질 사용할 것

아. 도시가스 설비

1) 가스 관련법규에 적법하게 검토설계

2) 가스관 인입에 따른 도로굴착 및 분담금 사항 등 가스공급 사업자와 사전 협의 후 검토설계

자. 오수정화설비 및 폐수처리시설

1) 관련 법규에 따라 건축물 규모 및 지역 특성을 감안하여 오수처리 방식 검토 설계(자연환경 피해 최소를 위한 최적 오수처리시설 반영 등)

2) 오수시설 악취가 충분히 배기될 수 있도록 환기시설 도입

3) 배관, 저수조 등 내진기준에 적합하게 설계

4) 200인조 이상 강제배출형 부패식 정화조를 설치할 경우 공기공급장치 등 악취 저감장치 설비를 갖추도록 설계

차. 주방설비 : 주방기구 설치여부 검토

카. 기타사항

1) 각 설비의 방진․방음 및 내진에 대책 검토설 계

2) 배관피트는 방음과 방충, 보온을 위해 밀폐형으로 구성하고 충분한 공간을 확보한다.

3) 환기는 실별 특성에 맞추되 1, 2, 3종 환기와 방음, 클린룸 항온항습을 적절히 구성한다.

4) 승객용과 실험기구 및 실험장비 반입을 위한 화물용 승강설비를 검토한다.

4. 기타 유의사항

가. 본 용역과 유사한 용도로 우리 군 및 타 도시에 적용되어 있는 설비방식을 충분히 검토·분석하여 미비점을 보완할 수 있는 방식을 선정하여야 하며, 특히 급수원 확보 및 오수 처리와 관련하여 적정 대책을 강구 반영하여야 한다.

나. 건축, 토목, 전기 등 타 공사(공정)와 연관되는 부분을 면밀히 검토 후 설계에 반영하여 기계설비의 원활한 기능을 유지하도록 설계하고, 향후 운영자의 입장에서 설계하여 각종 하자 등에 능동적으로 대처할 수 있도록 한다.

다. 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적방식과 신․재생에너지 이용방안을 검토하여 반영토록 한다. 단, 지열시스템 선정 시 용역감독자와 사전 협의하고 시험천공 후 시험성적서 등을 제출하여야 한다.

라. 초기 시설투자비, 운전경비, 유지관리비 및 투자효과를 기대할 수 있는 측면을 고려하여 경제적인 설비방식을 채택한다.

마. 최신기술 적용으로 준공 후 기술 환경의 변화에 따른 설비방식의 상대적 낙후성을 방지하고, 차후 설비의 유지보수 및 설비방식의 교체가 용이토록 설계한다.

바. 노출되는 설비는 건축 미관과 조화가 되도록 검토하고, 내부의 설비는 내장공사를 검토하여 설계한다.

사. 기계실, 피트층 및 장비반입구 등은 유지보수가 용이하도록 적절한 공간을 확보하여야 하며, 기본설계 시 용역감독자와 사전 협의하여 설계에 반영한다.

【실 시 설 계】

1. 작성기준

가. 냉․난방 공조설비

1) 공조조건별(부하특성, 사용시간, 방위 등)로 구역 분할제어가 가능한 시스템 검토설계

2) 층고가 높은 실은 건축과 충분히 협의하여 공조방식 선정 설계

3) 각 설비는 기기별 특성과 이용인원, 사용시간 등에 따른 부하계산

4) 각 설비의 특성을 고려한 공조방식 선정

5) 배기열 등 폐열을 재이용하는 에너지절감 시스템 검토

6) 시스템별 LCC분석

나. 열원설비

1) 열원기기 및 부대 장비류는 부하운전효율이 좋은 것을 선정하고, 부하조건에 따라 최고의 성적계수를 유지할 수 있도록 대수 분할 또는 비례제어가 가능토록 검토설계

2) 건축물 용도 및 특성을 감안한 열원방식 검토설계(지열 등 신재생에너지, 시스템에어컨, 심야전력이용방식)

3) 태양열, 지열 등 신․재생에너지의 시스템별 LCC 분석

다. 위생설비

1) 절수형 저소음 위생기구 사용 검토

2) 급수공급 방식에서 수압 및 각 실별 관말수압에 대한 충분한 검토(수압손실)와 오․배수설비(배수구와 연결문제) 검토설계

3) 급탕방식은 적용 가능한 방식을 비교 검토하고, 급탕이 경제적으로 공급 가능 하도록 시스템을 구성하여야 한다.

4) 급수설비는 공급과 유지관리측면을 고려하여 계획하고, 급수관 인입은 사전에 관할 맑은물사업소와 협의하여 인입위치 및 구경 등을 결정한다.

라. 소방설비

화재발생 시 피해를 최소화 할 수 있도록 하고, 소방법령에 적합한 방재시설 검토설계(반드시 관할 소방기관 사전협의 및 설계도서 작성)

마. 환기설비

1) 각 실의 정․부압 검토

2) 실내 공기 질 향상 및 환경부하 발생 최소화 방안

바. 자동제어 및 중앙감시설비

1) BUILDING AUTOMATIC SYSTEM에 대한 각 그룹(실)별 제어방식을 검토설계

2) 기계, 전기분야 통합 중앙감시 제어방식 검토설계

3) 자동제어와 기계설비 공종 간 구분이 용이하도록 설계도면에 공사범위 표시

사. 도시가스설비

1) 도시가스 사용예상량을 파악하여 해당지역 가스공급자와 사전 협의하여 기본계획 검토설계

2) 인입가스관(주관⇒기계실)은 비노출로 설계하고, 정압기실은 주 통로 등 동선을 감안하여 설치 위치 검토 설계

3) 경보장치, 유량계 및 가스관 재질 등 적정여부 검토 설계

(반드시 가스안전공사 사전협의 및 설계도서 작성조치)

4) 도시가스 인입 분담금 파악 및 내역 반영

아. 오수정화시설

1) 환경부 고시에 따른 오수량, 수질, 처리방식 및 차집관로의 연결 검토설계

2) 처리장 악취는 충분히 배기될 수 있도록 환기량 검토설계

자. 주방설비

1) 수용인원 감안하여 적정용량 및 기기종류, 충분한 공간 확보 검토, 음식물 조리 시 취기 확산 방지를 위한 환기설비 구비 검토

2) 이용 인원수를 기준으로 하여 조리 및 배식이 위생적이고 원활하게 될 수 있도록 하며, 동시 인원, 식자재 보관 및 잔반 등의 쓰레기 처리시설을 고려하여 계획한다.

3) 배수를 위한 트랜치 및 그리스트랩 장치, 냉․온수 급수장치, 후드용 덕트 등 식당 및 주방의 운영을 위한 기본시설을 갖추도록 한다.

4) 주방기구 사용자재는 스텐레스 강판을 원칙으로 한다.

5) 주방의 종합위생설비는 HACCP기준에 의한 설계를 원칙으로 한다.

차. 방음․방진설비

1) 샤프트내의 배관은 소음 및 진동이 전달되지 않도록 차단재를 설치한다.

2) 실내의 소음과 진동은 실내허용 소음 및 진동기준(관련법․규정) 이하로 유지되도록 방지대책(작업방진, 소음기 설치 등)을 강구하여야 하며, 재실자의 업무를 방해하지 않은 상태이어야 한다.

3) 기계, 전기 장비가동 시 발생되는 소음으로 민원이 발생되지 않도록 대책을 강구하여야 한다.

카. 기타사항

1) 냉․난방기 실외기는 주 통로 등 동선을 감안하여 설치 위치 검토설계

(건축설계자 협조를 통한 실외기 전용구역 지정조치)

2) 건축, 전기 등 타 공종 간 누락, 중복, 간섭여부의 면밀한 검토 및 도면상 공종 구분이 될 수 있도록 작성할 것

3) 장애인 이용 화장실 등 편의시설은 관계 법령 등에 맞게 검토설계

4) 각 장비 및 배관, 닥트 등에 대한 방음, 방진 검토설계

5) 공조 소음이 불가피한 경우에는 흡음닥트 반영설계

4. 전기분야 과업내용서

【기 본 설 계】

1. 과업의 범위

기본 계획의 제반 조건과 요구 사항 등을 바탕으로 하여 기본적인 내용을 설계도서에 작성 제출하여야 한다.

가. 전기분야

1) 기본 설계도서(배치, 평면, 입면, 일반단면도, 설계설명서, 보고서 등)

2) 수전 설비 단선 결선도 및 용량 계산서

3) 예정 부하 용량 계산서

4) 한전인입, 전기실, 간선, 전등 배치도 및 구내 보안등 배치도

나. 소방(전기)분야

1) 기본 설계도서(배치도, 평면도, 입면도, 일반단면도, 설계설명서, 보고서 등)

2) 층별 소방 설비(감지기, 경보기, 수신기, 발신기)위치 등

3) 방재설비의 산출서

다. 기타 분야별 설계도서 작성기준은 건설공사설계지침서 중 용역 심의규정 참조

2. 관계법규

설계용역자는 본 설계와 관련한 제반 법규에 적합하게 설계하여야 한다.

3. 기본설계 수행

가. 아래 내용을 검토하여 설계한다.

1) 설계의 합리성 기기의 안전성 및 설치시설의 적정성 등에 관한 기본사항 조사 검토 및 결정

2) 신재생에너지 설비에 대한 구체적 검토와 설계 및 시공에 따른 연간 예상 에너지 절감량 산출 등 운용 효율성을 감안한 설계를 수행하고, 시공 과정에 대한 시방서를 작성하여야 하며, 에너지정책 홍보와 확산 방안을 검토하여야 한다.

3) 특정기술(제품) 선정 심사를 위한 자료작성 및 심의결과를 반영하여야 한다.

4) 기타 우리 군에서 지시하는 사항

나. 기본설계는 기초적인 기본 개념이 설계 도서에 구체적으로 표현되어야 하므로, 각종 조사 결과를 기본설계에 반영하여야 한다.

다. 본 용역의 시설규모 및 기본계획에 관련된 사항들에 대하여 논리적 기술적으로 타당성 당위성 등을 정립하여야 하고, 이에 대한 종합적인 보고서를 작성 후 제출해야 한다.

라. 검토 내용

1) 전기 분야

가) 설계 적용 법규 및 기준

(1) 한국공업규격

(2) 전기사업법, 전기공사업법

(3) 한국전기설비규정(KEC)

(4) 전기공급약관(한국전력공사)

(5) 전기에 관한 각종 관련 규정

(6 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」,「신에너지 및 재생에너지

개발․이용․보급 촉진법」

나) 수, 변전 설비

(1) 전력 인입검토

(2) 수변전설비 및 부하증설에 따른 전기실 공간 확보 유무검토

(3) 손실최소화 구내배전 계획

(4) 동력설비 간선 계획

(5) 상용 전원 인입방식 수전점 인입케이블 경로 및 차단기 등의 설계

(6) 변압기 용량 형식 1차 및 2차 전압 뱅크 수의 선정 및 설계

(7) 특고압반, 고압반, 저압반등의 용량크기 보호 계전기의 효과적 배치

(8) 수배전반 경로 및 반출 설계

(9) 역률 개선용 콘덴서의 용량 대수 검토 결정

(10) 직류 축전 설비의 설치 공간(실) 확보 및 용량 대수 형식 선정

(11) 무정전 전원 장치의 공급 및 공급 범위 결정

(12) 국가화재안전기준에 의한 분전반 내부 소화기구 설치 검토

(13) 트레이, 배전반 및 분전반 등 전력설비의 내진형 제품 적용

(14) 전기설비에 대한 내진대책(다음 시설 포함)을 조사·반영하여 적정 수준의 내진설계가 되도록 검토 계획한다.(비 구조분야 및 소방전기설비 등)

다) 자가발전 설비 및 비상 전원 설비

(1) 비상용 발전기의 용량 배전방식 전압 운전 방식 검토 결정

(2) 발전기 증설유무 위치 소요 면적 연도 경로 설계

(3) 발전기 방렬 소음 및 진동 대책

(4) 축전지용량 결정 및 정류기 설계

(5) 예비전원 관련 업무(소방시설 설치 유지관리 및 안전관리에 관한 법률, 건축법 등) 검토

라) 조명 및 전열 설비

(1) 적정 조도계산에 의한 각 실별 등수 등종 결정 및 에너지 절감형 조명설비 검토

(2) 각 분야별 분기 회로별 총 부하용량 계산

(3) 정전에 대비 주요실의 DC비상 전원 설치 검토

(4) 에너지절감 및 유지 관리 편의를 위한 합리적 조명 제어방식 검토

(5) 전기 설비 기술 기준에 적정한 조명 방법의 검토

(6) 각동 각 실별 기준 조도에 대한 검토 및 회로 검토

(7) 각동 각 실별 조명시설 후 유지 관리 보수를 고려한 시설 검토

(8) 빛의 양적 질적 변화가 적은 조명 방식 검토

(9) 옥외 조명등(취부등, 인접하여 설치하는 등기구, 기타) 외등 설치는 건축설계자의 의견을 충분히 반영

(10) 공공기관에너지이용합리화 추진에 관한 규정 검토

마) 동력 설비

(1) 전력선 포설방식 및 옥내관로 구분 등

(2) 사용 전선류의 허용전류 및 전압 강하 계산에 의한 선종 규격, 접지선 결정

(3) 동력 전원 및 부하 설비

(4) 동력제어반은 각 부하 유니트별 인출형의 것으로 각 기계실별로 설계

(5) 자동, 수동 조작이 가능하고 기계 설비 자동 시스템과 상호연동이 가능토록 설계

(6) 설비 부하 내용을 충분히 숙지하여 이에 맞게 설계(차단기, 전자 용량등)

(7) 냉난방, 환기, 급배수, 오수정화 등 설비 부하 및 기타 전원설비 일체

바) 피뢰 및 접지 설비

(1) 피뢰 보호각에 의한 건물 보호 및 시설물 보호 검토 설계

(2) 건물 접지에 대한 검토

(3) 접지 개소 및 접지 종별 검토

사) 기타 부대설비

(1) 피뢰침 설치 여부 검토 및 안테나 보호용 피뢰기 설치 검토

(2) 전기, 통신, 방재용 전원 및 접지 설비 일체

(3) 각종 기기 선정의 장, 단점의 비교 검토 설계

(4) 각종 장비 및 기구 설치 시 미관 및 기계설비 등과 장애 여부 검토

(5) 사용 주체별 및 사용 용도별 요금 고지서 분리 검토

2) 소방(전기)분야

가) 설계적용 법규 및 기준

(1) 소방시설공사업법, 동 시행령, 동 시행규칙

(2) 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 동 시행령, 동 시행규칙

(3) 화재안전기준(NFSC)

(4) 기타 관계법령

(5) 소방시설 내진설계 기준(국민안전처 고시 제2015-138호)

나) 화재 경보 설치

(1) 자동화재탐지 설비

(2) 주 수신반은 중앙 공급실과 연동이 되고, 부수신반은 상시 근무자가 있는 곳에 설치하며 비상방송연동 회로 내장

(3) 감지기 종류 및 수량은 용도와 면적에 맞게 설계

(4) 각 층별 발신기 설치는 법적 수용 거리 이내에 두고, 기계 설비의 소화전과도 연동되도록 검토

(5) 경계구역 및 구역 일람표 작성

(6) 방재 설비와 관련한 전원 검토

(7) 비상 방송설비는 자동화 탐지설비의 감지기와 연동하여 작동설계

다) 유도등 설비

(1) 용도 및 장소별 피난 유도등과 통로 유도등 설치

(2) 기계설비 중 소방시설과 관련한 방재설비의 검토 설계

라) 기타 소방법이 정하는 설비 검토에 대한 검토

【실 시 설 계】

1. 과업의 범위

실시설계는 기본설계에서 설명은 되었으나 도서화 되지 못한 사항 등을 공사시행에 필요한 설계도서로 작성하는 것을 말한다.

가. 일반 및 특기 시방서

나. 설계도면

다. 설계 내역서(설명서, 시방서, 내역서, 일위대가, 물량 산출근거, 단가 산출근거, 각종 계산근거 등)

라. 각종 계산서(부하 계산서, 조도 계산서, 비상 전원 및 예비 전원 용량 계산서, 축전지 부하 계산서, 전압강하 계산서, 단락 전류 계산서, 차단기 용량 검토서, 기타)

마. 기타 우리 군에서 요구하는 사항

2. 설계도서 작성 기준

가. 공통 사항

1) 기본설계에서 결정된 각종시설의 형식 및 기준을 재검토하여 보고 후 최종 확정안에 대하여 세부 실시 설계도서를 작성한다.

2) 전기, 정보통신, 소방 관련 법규 및 규정, 기준에 적합할 것

3) 기타 본 과업에 적용이 되어야 할 관련 기준 등

4) 설계용역자는 과업내용을 숙지하여 본 과업내용이 적합하도록 하여야 하며, 성과품 납품 시 또는 그 후에라도 잘못된 사항이 발견되었을 때에 이를 숙지하지 않은 책임은 설계 용역자에게 있으며 즉시 보완 수정하여야 한다.

5) 설계도서 작성

가) 설계도서 작성

(1) 설계도서 작성은 우리 군이 지정하는 규격으로 한다.

(2) 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글 사용을 원칙으로 한다.

(3) 설계도서의 작성은 원고와 원도를 작성하여 감독원의 검사를 받은 후 인쇄하여야 한다. 설계도면 작성을 위한 제도는 K.S.F/1001 도복 제도 통칙에 준하여야 한다.

(4) 평면도는 각 지하매설물, 지상 구조물 등에 대한 상호 연관성을 고려하여 종합도(축적 1/200～1/600)를 작성하고, 축적(1/100～1/200) 내외인 세부 평면도를 작성하되 각종 도면 여백에는 현장에서 시공이 용이하도록 시공 순서 및 중요 사항 등을 표시하여야 한다.

나) 사용자재 조서

주요 자재는 K.S표시품을 사용하고 K.S표시품이 없을 때는 감독원의 별도 지시에 따라 설계한다.

다) 동원 인원 계획표, 장비 투입 계획서, 소요 공기일수 산출은 공정 일․월별로 작성하여야 하며 계획 공정은 단계별에 의한 공정표를 작성 제출하여야 한다.

라) 예산서 작성

(1) 수량 및 단가 산출

수량 및 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 공종별, 재료별로 산출하여 편집하기 편리하도록 작성하고 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서 상에 명시하여 전산내역으로 제출하여야 한다.

(2) 적용품셈

(가) 국토교통부 제정 표준품셈에 의거 산정한다.

(나) 노임은 시중 노임 단가(대한건설협회 발표)를 기준으로 한다.

(다) 재료 산출, 단가 산출서 작성

재료산출, 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 공종별·재료별로 산출하며 참조하기 편리하도록 편집하여야 하며, 공종별 단가는 산출서 상에 구체적으로 명시되어야 한다.

(라) 설계도서 작성은 우리 군의 발주 계획상 필요에 의하여 공종별 작성 요구 시 이에 따라 구분한 설계도서를 제출하여야 한다.

(마) 설계도면

① 범례, 도면 목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 용량, 기타 사항을 표기한 일람표를 표기하여야 하며 도면의 내용은 다음과 같다

◯ 배 치 도 : 기본 설계 표시된 사항 구체화된 내용

◯ 계 통 도 : 각 설비별 세부 계통도

◯ 평 면 도 : 각 설비 평면도, 기구 및 주요 설비 확대 평면도

◯ 단 면 도

◯ 배관 및 배선도

◯ 기계 기구 및 설치 상세도

◯ 블록 다이어그램

◯ 기 타 : 자동제어 설비 구성도, 그래픽보드 및 판널 상세도, 장비별 기초도,

계장 장비 상세도, 부대시설 상세도

(바) 시방서

① 일반 시방서 : 공사 관련 필요한 사항 및 공사 시방

② 특별 시방서 : 주요 장비 제작 시방, 설치 시방, 주요 자재 재질 및 규격은 주의를 요하는 사항

③ 공종별, 이기별 누락 없이 상세히 기록

(사) 설계 내역서

① 공사 설명서

② 공종별 세부 내역서

③ 일위대가표

④ 수량 및 공량 산출서

⑤ 단가 산출서

⑥ 기타 필요한 산출 근거(견적서, 제품 카탈로그, 취급설명서등)

나. 전기 분야

1) 수․배전설비

가) 사용용도에 적합한 케이블 및 차단기 설계(수전설비 용량(변압기), 전압수전 방식, 수변전실 면적, 위치, 배전전압방식)

나) 수․배전 부하 계통 경로 설계

다) 접지 설비

라) 비상 전원 용량, 위치 설계

마) 단락전류 계산서 및 계전기 정정 계산서

2) 동력 및 조명의 전력 간선 설비

가) 사용 전선의 허용 전류 및 전압 강하 계산에 의한 선종 규격․접지선 결정

나) 경로 배선 포설시 전선관을 이용 허용 전류 감소 계수를 적용 전선 굵기 선정

다) 전선과 전선관은 설비 증가 대비 여유 있게 설계

3) 동력 전원 및 부하 설비

가) 전등 동력 분전반은 각 실별로 설계

나) 각층별 면적에 맞게 비상 콘센트 수량 및 분기 회로수 설계

다) 설비 부하 내용을 충분히 숙지하여 용량에 맞게 설계

라) 환기 설비 부하 및 기타 전원 설비 일체

마) 동력 전력간선 설비

바) 전력선 포설방식 및 옥내관로 구분등

사) 사용 전선류의 허용 전류 및 전압 강하 계산에 의한 선종 규격, 접지선 결정

4) 동력 전원 및 부하 설비

가) 동력 제어반은 각 부하 유니트별 인출형의 것으로 각 기계실별로 설계

나) 자․수동 조작이 가능하고 기계설비 자동시스템과 상호 연동이 가능토록 설계

다) 설비 부하 내용을 충분히 숙지하여 이에 적합하게 설계(차단기, 전자개폐기, 열동계전기, 용량 등)

라) 냉․난방 공조, 환기, 급·배수, 오수정화 등 설비 부하 및 기타 전원 설비 일체

5) 조명 설비

가) 적정 조도 계산에 의한 각 실별 등수 등종 결정 및 실별 내용물과 간격 유지

나) 각 층별, 분기 회로별 총 부하 용량 계산(최대한 자연광을 이용하여 설계)

다) 규정 조도 및 지점별 조도 분포(균등)설계

라) 에너지 절감 및 유지 관리 보수 편의를 위한 조명제어방식 검토 설계

마) 적당한 밝기 및 연색이 우수한 조명 설계

6) 예비 및 비상전원

가) 비상발전기 용량은 전체 부하 설비용량에 대하여 부하증설에 따른 정전

시 필요 전원 공급 장소에 따라 용량 선정

나) 기존 비상발전기연계사용 및 비상 발전기 기동 방법에 대한 검토

다) 주요장비 무정전 전원공급장치(UPS)공급 검토

7) 피뢰 및 접지 설비

가) 건축물 전체를 보호할 수 있는 설비

나) 접지 개소 및 접지 종별, 층별 접지 설비 검토

8) 기타 사항

가) 각종 기기 선정의 장단점 대비 검토 설계

나) 전력선과 통신선의 충분한 이격거리유지(유도장애)

다) 전기, 통신, 방재용 전원 및 접지 설비 일체

9) 방재분야(자동 화재 탐지 설비)

가) 배선은 전기 설비기술기준 및 소방설비 기술기준에 관한 규칙에 의하여 설계

나) 제어실에서 층별 감시를 할 수 있도록 설계

다) 감지기 취부 높이 종류 및 수량은 용도와 면적에 적정하게 설계

라) 각 층별 발신기 음향장치 설치는 법적 수용 거리 이내에 두도록 하고 소화전과 연동되도록 한다.

마) 경계 구역 및 구역 일람표 작성

바) 비상 방송 설비는 자동 화재 탐지 설비의 감지기와 연동하여 작동하게 설계

10) 유도등 설비

소방대상물 및 장소별 피난유도등 표지와 통로유도등 표지 설계

11) 설비 분야 시설물 관련 전기 설계

용도에 맞게 검토하여 설계 건축 설계자와 필히 협의하여야 한다.

12) 기타 사항

본 공사는 전기공사업법 및 관계법령·법류·규정에 위반됨이 없이 설계하여야 한다.

다. 소방분야 (전기)

1) 자동화재탐지 설비 검토 설계

2) 화재수신반 규격 방식 등에 대한 검토 보고

3) 감지기의 위치 종류 설치 면적에 대한 검토 설계

4) 기계 분야의 소방시설 자료 검토 후 연계하여 설계

5) 소방법 및 소방 관련 각종 규정에 적합하게 설계

라. 기타 사항

1) 설계 내역서

가) 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가 계산 방식에 의거 작성하되 전산 프로그램으로 구성하여 작성한다.

나) 공사비 적산은 정부표준품셈, 시중노임단가 등에 의거 산출하되 사전 조사하여 작성한다.

(1) 재료 단가 조사

(가) 본 공사에 소요되는 모든 자재는 각 품목, 품질 및 규격별 조사한다.

(나) 자재단가는 조달청 발행 “가격 정보”를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 건설협회 발행 “거래 가격”, 사단법인 한국물가협회 발행 “물가자료”, 사단법인 한국물가정보 발행 “물가정보” 중 서로 비교하여 최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 시에는 시중거래 실례가격(3개 업체 이상 견적서 첨부)을 기준한다. 단, 재료 및 자재 단가 운반비가 포함되지 않은 경우 구입장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

(다) 사용자재는 국내 생산품 중 K.S품 중 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 경우는 사용계획, 사용처 및 사유를 알리고 이와 대체할 수 있는 국내 제품과 비교 검토하여 적용한다.

(2) 수량 산출

(가) 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합되도록 적의 결정하여 적용한다.

(나) 공사규모, 공기 및 현장 조건 등을 비교 검토하고 기계 장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교하여 경제적이고 합리적인 공법을 채택하여 적정하게 산정한다.

(다) 사용단위는 C.G.S단위로 하되 소수점 이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

(라) 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오가 없도록 하여야 한다.

(3) 주요 자재

(가) 주요 자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작 방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

(나) K.S에 없는 제품사용 시 공사조건에 맞는 관련 규격 및 시방서(외국 규격 등) 등을 검토하여 사용토록 한다.

(다) 주요 자재는 회계예규「시설공사계약 일반조건」제10조 및 제17조의 규정에 따라 운용 관리하는데 지장이 없도록 하고 설계 도서를 작성하여야 한다.

(라) 우리 군이 제공한 설계자료와 기타사항은 설계용역 수행을 위해서만 사용한다.

(마) 우리 군의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전 물량 파악이 있을 시 즉시 산출하여야 한다.

(4) 산업재해보상보험 요율은 노동부에서 고시된 보험 요율에 따른다.

(5) 안전 관리비

노동부 고시에 의한 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준에 따른다.

(6) 기타 보험 등 제반 법규에 의해 고시된 요율에 따른다.

2) 공정표

가) 본 과업의 공사 공정표는 공사의 내용 파악이 용이하도록 작성한다.

나) 특기시방서에 명시된 공종 중 우리 군이 지정하는 주요 공종은 별도로 공정표를 작성한다.

3) 실시설계 종합보고서

가) 본 종합보고서는 기본설계에서 실시 설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술하여야 하며, 관리 운용에 관한 사항과 각 실면적 및 기능과 시설개요 등 각 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 해야 한다.

나) 보고서의 내용은 공사 수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합 보고서이어야 하며 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

(1) 과업의 목적 및 내용

(2) 사전 조사 내용 요약

(3) 설계기준

(4) 구조물 설계안별 검토내용

(5) 세부 설계 내용(공종별 비교 검토 내역 포함)

(6) 주요 자재 및 수급계획

(7) 시공계획

(8) 기타 참고자료

(9) 기타 우리 군의 요구사항

5. 통신분야 과업내용서

【기본 및 실시설계】

1. 과업의 범위

계획설계의 제반조건과 요구사항 등을 바탕으로 하여 기본적인 내용을 설계도서에 작성 제출하여야 한다.

2. 관계법규 조사

용역자는 본 설계와 관련한 제반법규를 세밀히 조사하여 법규 및 규정에 적합하게 설계하여야 한다.

가. 방송통신기본법, 동법 시행령, 시행규칙

나. 정보통신공사업법, 동법 시행령, 시행규칙

다. 전기통신사업법, 동법 시행령, 시행규칙

라. 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

마. 한국정보통신공사협회 제정 “구내통신설비공사편람”

바. 한국정보통신공사협회 제정 “표준공법-종합유선방송구내전송선로설비”

사. 한국정보통신공사협회 제정 “음향영상설비공법”

아. 소방법, 동법 시행령, 시행규칙

자. 주차장법 시행규칙

차. 기타 정보통신에 관한 국내․외 각종 관련규정 준수

3. 용역수행

가. 아래 내용을 검토하여 설계를 완료한다.

1) 설계 용역자는 완료이전에 한국전파진흥협회 구내용이동통신설비 설치 협의 등 각종 심의 및 협의를 득하고 그 결과를 설계에 반영하여 설계 성과품을 납품하여야 한다.

2) 설계의 합리성, 기기의 안정성 및 설치시설의 적정성 등에 관한 기본사항 조사․검토 및 결정

나. 기본개념이 설계도서에 구체적으로 표현되어야 하므로 실현 불가능하거나, 제반 법규 및 규정에 저촉되어 공사시행이 불가능한 내용이 되어서는 안 되며, 각종 조사결과를 설계에 반영하여야 한다.

다. 검토내용

1) 공통사항

가) 주관부서 의견수렴 등 건축도면을 고려한 후 설계에 임하여야 한다.

나) 각종 통신설비 전력선과의 법적 이격거리 검토 설계

다) 층간 케이블 배선을 위한 비트층 확보

라) 각 SYSTEM별 단독전원 확보 방안 강구

마) 각종 정보통신 시설 장비 및 기구 설치 시 미관 및 전기․기계설비 등과의 장애 여부 검토 설계

바) 각종 통신설비 접지개소 검토 설계

사) 각종 정보통신기기 배치 및 구성도 설계

아) 정보통신실 검토 설계

자) 주요 기기 무정전전원장비(UPS) 검토 설계

차) 기타 소방법이 정하는 설비 검토 설계

카) 정보통신실 검토 설계

타) 초고속 정보통신설비 설계

2) 교환설비

가) 민원전화(일반), 긴급전화(전용회선)의 원활한 운영을 위한 전화교환장비 선정, 국선 및 내선 용량계산, 충분한 운영관리 공간(통신실) 확보 검토

나) 최단거리의 국선 인입경로 확정 (관할전화국과 협의 결정→증빙자료첨부)

다) MDF, IDF, 국선단자반등 층별 운영 설치를 위한 위치 선정

라) 사무실 면적 및 용도에 맞게 전화선로 구성

마) 시스템박스(전화수구)의 예비를 고려한 간선확보 검토

3) 네트워크(LAN)설비(무선랜설비)

가) 네트워크 운용을 위한 통신장비 선정 및 운영 공간 확보 검토 설계

나) 정보시스템(전자결재, 인터넷 등) 운용을 위한 네트워크망 구성도에 적합한 시스템 검토 설계

다) 사용인원(상주) 및 용도에 적합한 회선수 선정

4) TV설비

가) 위성방송 수신시스템 검토설계

나) 종합유선방송구내전송설비 규정에 의한 CATV(HAED END) 시스템 수신방안 검토 및 설비 선정

다) 낙뢰 및 강전류 전선과의 접촉 등으로 인한 이상전류전압의 유입을 방지할 수 있는 안테나 보호설비 검토

5) A/V(방송,영상)설비

가) 화재발생 및 비상시에 필요한 방송 시스템 검토 설계

나) 회의실에 필요한 방송 시스템 검토 설계

다) 영상회의시스템 설치방안 검토 설계

라) 검사소의 비상시 필요한 통신 시스템 설계

6) 방범설비(CCTV)

가) 주요 시설물 상시 감시를 위한 CCTV 시스템 검토설계 및 운영 장소 확보 검토

나) 주요 출입구 등 CCTV카메라 설치위치 선정

7) 기타설비

가) 관리 운영상 필요하다고 판단되거나 현 운영부서 요구사항 및 기존 인프라 연계시스템 등 주요사항 검토 반영, 예) 출입통제설치, 기타보안설비 등

나) 무선송수신용 안테나 탑 설치 등 특수설비에 대한 사항 검토

8) 전관방송설비

가) 전관방송 및 비상방송이 가능하여야 하며, 용도별로 회로가 구분되어 부분 지역방송 및 전체방송이 가능하도록 디지털형으로 설계하여야 한다.

나) 소방관련 법규를 면밀히 검토하여 위배되지 않도록 하며 화재 또는 비상시, 방재시스템과 연동하여 비상유도방송이 가능하게 계획하고, ATT 등을 적정한 장소에 반영하여야 한다.

【실 시 설 계】

1. 과업의 범위

기본 및 실시설계에서 검토되었던 전반적 사항을 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 표기한 설계도서로 작성하는 것을 말하며, 다음의 내용이 수록되어야 한다.

가. 일반 및 특별시방서

나. 설계내역서(내역서‧ 일위대가, 물량산출근거, 단가산출근거, 각종계산근거 등)

다. 각종계산서

라. 설계도면

2. 설계도서 작성기준

가. 공통사항

1) 각종 시설의 형식 및 기준을 검토하여 보고 후 최종 확정안에 대하여 세부 실시 설계도서를 작성한다.

2) 정보통신 관련 제반법규 및 규정, 기준에 적합할 것

3) 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련 기준 등

4) 설계용역자는 과업내용을 숙지하여 본 과업 내용이 적합하도록 하여야 하며, 성과품 납품 시 또는 그 후에라도 잘못된 사항이 발견되었을 때에 이를 숙지하지 않은 책임은 설계 용역자에게 있으며, 즉시 보완 수정하여야 한다.

5) 설계도서 작성

가) 설계도서 작성은 발주기관이 지정하는 규격으로 한다.

나) 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

다) 설계도서의 작성은 원고와 원도를 작성하여 발주기관의 검사를 받은 후 인쇄하여야 한다.

라) 설계도면 작성을 위한 제도는 K.S.F/1001 제도통칙에 준하여야 한다.

마) 평면도는 각 매설물, 구조물 등에 대한 상호 연관성을 고려하여 종합도(축척 1/200～1/600)를 작성하고, 축척(1/100～1/200)내외인 세부평면도를 작성하되 각종 도면여백에는 현장에서 시공이 용이하도록 시공순서 및 주의사항 등을 표시하여야 한다.

6) 사용자재 조서

주요자재는 KS 표시품을 사용하고 KS 표시품이 없을 때는 발주기관과 협의하여 동등  이상의 제품을 사용토록 하고, 고효율에너지기자재 인증 제품을 사용토록 한다.

7) 동원인원 계획표, 장비 투입계획서, 소요 공기일수 산출은 공정, 일․월별로 작성하여야 하며, 계획공정은 단계별·공종별로 PERT/CPM방식에 의한 공정표를 작성 제출하여야 한다.

8) 예산서 작성

가) 수량 및 단가산출

수량 및 단가산출은 각각 별책으로 작성하되 공종별, 재료별로 산출하여 참조하기 편리하도록 작성하고 공종별 단가는 일위대가표 및 단가산출서상에 구체적으로 명시되어야 한다.

나) 적용 품셈

(1) 정부제정 표준품셈에 의거 산정한다.

(2) 노임은 최근 시중노임단가(대한건설협회 발표)를 기준으로 한다.

다) 설계도서 작성은 발주기관의 발주계획상 필요에 의하여 공종별 작성요구 시 이에 따라 구분한 설계도서를 제출하여야 한다.

9) 설계도면

범례, 도면목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 수량, 용량, 사양, 기타 사항을 표기한 일람표를 표기하여야 하며, 도면의 내용은 다음과 같다.

가) 배치도 : 기본설계에 표시된 사항의 구체화된 내용

나) 계통도 : 각 설비별 세부 계통도

다) 평면도 : 각 설비별 평면도, 기구 및 주요설비 확대 평면도

라) 단면도 마) 배관 및 배선도 바) 기계기구 및 설치 상세도

마) 블록다이어그램

바) 기타 : 장비별 기초도, 부대시설 상세도 등 기타 필요한 도면

10) 시방서

가) 일반시방서 : 공사 관련 필요한 사항 및 유의하여야 할 일반적인 사항명시

나) 특기시방서 : 일반시방에서 기술되지 않은 내용으로 공사집행 상 특별히 유의하여야  할 사항을 명시

다) 자재시방서 : 사용하고자 하는 기자재의 특성, 정격, 운용방법, 제작조건 및 기준 등을 명시

라) 공종별, 기기별 누락 없이 상세히 기록

11) 설계내역서

가) 공사설명서

나) 공종별 세부내역서

다) 일위대가표

라) 수량산출서

마) 단가산출서

바) 기타 필요한 산출근거 (견적서, 제품카탈로그, 취급설명서 등)

나. 정보통신분야

1) 공통사항

가) 장비별 부하계산 수치에 의한 각 SYSTEM별 단독전원 및 비상전원 확보 검토 설계

나) 각종 통신설비 규정에 의한 접지 저항치 확보토록 접지설비 검토설계

다) 각 설비는 우리 군의 요구 및 경제성을 감안하여 설계하되, 외관이 미려하고 기술기준에 적합하게 검토 설계

라) 정보통신실 검토 설계

마) 주요 기기 무정전전원장비(UPS) 검토 설계

바) 기타 소방법에서 정하는 설비 검토 설계

사) 초고속정보통신설비 검토 설계

2) 교환설비

가) 옥내ㆍ외 회선수 및 케이블 규격에 적합한 시스템설계

나) 사무실 면적 및 용도에 맞게 적합한 전자교환기 산정 및 카드회선수 설계

다) MDF, IDF, 국선단자반 등 설치위치 선정 용량 산출

라) 각 단자반과 단자반간의 예비 배관ㆍ배선 설계

마) 사무실 면적 및 용도에 맞게 전화선로 구성

바) 전자교환기 소요용량 및 예비회선을 고려하여 설계

사) 옥외간선 구성

3) 네트워크(LAN)설비

가) 종합정보시스템운용을 위한 내ㆍ외부 네트워크 망 구성 설계

나) 정보통신네트워크시설장비 선정 및 데이타 MDF, IDF 등 정보통신 설비 분배반 위치 선정 설계다) 사무실 면적 및 용도에 적합한 LAN설비 운영

4) TV(CATV) 공시청설비

가) TV공시청 전계강도 측정 및 측정치에 의한 TV수신 설비 검토 설계

나) 종합유선방송 전송설비 규정에 의한 CATV 수신방안 검토 설계

다) 증폭기의 성능을 고려, 수신자를 최대한 수용할 수 있도록 설치위치를 선정하여 설계

라) 유휴분배 및 분기단자는 사용하는 선로에 영향을 미치지 않도록 75Ω으로 종단토록 설계

마) 케이블 및 기기의 경연 변화에 대비, 구내증폭기의 최대 이득을 감안하여 검토 설계

바) 구내선로의 케이블 간, 케이블과 설비 간, 접속 및 연속된 설비 간의 접속은 규격 이상의 F형 과 FT형 커넥터 검토 설계

사) 전송품질 확보를 위한 구내증폭기의 종속접속 단수가 2단 이하가 되도록 검토 설계

5) A/V(방송, 영상)설비

가) 전관방송 설비는 앰프출력이 스피커출력의 약 30%정도 예비출력을 확보토록 설계

나) 화재수신반과 연동, 비상방송이 가능토록 구성

다) 수직, 수평배선 규격 검토 설계

라) 각 설비는 사용 장소에 따라 실내용적과 음의 잔향시간을 검토 설계

마) 설비 설치목적별, 장소별을 검토 적정한 SYSTEM이 구축되도록 검토 설계

바) 세미나실, 회의실 등에는 영상시스템 검토 설계

사) 영상설비는 사용목적 및 밝기 등을 고려하여 적합한 시스템으로 설계

6) 방범설비(CCTV)

가) 주요 시설물은 상시 감시기능이 가능하도록 하고, 충분한 시간(30일 이상)의 화상데이터를 녹화 보존가능토록 설계

나) 방범설비 제어선, 전원선, 영상케이블 등 규격 검토 설계

다) 추후 설비확장 검토 설계

7) 기타설비 : 출입통제설비, 기타 보안설비 반영

다. 기타 사항

1) 각종기기 선정의 장ㆍ단점 대비 검토 설계

2) 전력선과 통신선등 각종 설비의 이격관계로 인한 유도장애 검토

3) 건축반영 요구조건 조사 반영하고, 국내외의 유사한 사례조사 분석하여 반영될 수 있도록 검토

4) 표준화된 제품을 선정하여 유지보수 및 호환성 등에 유연성이 있게 설계

5) 정보통신공사업법 및 전기통신기본법등 제반법규를 충분히 검토하여 위반됨이 없이 적용

6) 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙의 공사원가 계산방식에 의거 작성하되 전산프로그램(또는 EXCEL)으로 구성하여 작성한다.

7) 공사비 적산은 정부표준품셈, 시중노임단가 등에 의거 산출하되 사전 조사하여 작성한다.

가) 본 공사에 소요되는 모든 자재는 각 품목, 품질 및 규격별 조사한다.

나) 자재단가는 조달청 발행「가격정보」를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는 대한건설협회 발행「거래가격」사단법인 한국물가협회 발행「물가자료」사단법인 한국물가정보 발행「물가정보」중 서로 비교하여 최저가를 적용하며, 상기 책자에 없을 때에는 시중 거래실제가격(2개 업체 이상 견적서 첨부)을 기준 한다. 단, 재료 및 자재단가 운반비가 포함되지 않는 경우 구입 장소로부터 현장까지 운반비를 계상할 수 있다.

다) 사용자재는 KS품사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에서 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 알리고 이와 대체할 수 있는 국내제품과 비교 검토하여 적용한다.

라) 수량 산출

(1) 수량 산출시 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합되도록 적의 결정하여 적용한다.

(2) 본 공사규모, 공기 및 현장조건 등을 비교 검토하고 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교하여 경제적이고 합리적인 공법을 채택하여 적정하게 산정하여야 한다.

(3) 단위는 미터단위로 하되 소수점이하 2위까지 하고 끝수는 반올림한다.

(4) 위의 모든 수량 산출에 관한 것은 착오가 없도록 하여야 한다.

마) 주요 자재

(1) 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

(2) KS 제품이 없는 자재사용 시 공사조건에 맞는 관련 규격 및 시방서등을 검토하여 사용토록 한다.

(3) 주요자재는 회계예규 "지방자치단체 공사계약일반조건" 제 규정에 따라 운용 관리하는데 지장이 없도록 하고 설계도서를 작성하여야 한다.

(4) 발주기관이 공급한 설계자료와 기타 사항은 설계용역 수행을 위하여만 사용하고 잉여분은 발주기관의 지시에 따라 반납하여야 한다.

(5) 발주기관의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전물량 파악이 있을 시 즉시 산출하여야 한다.

바) 산업재해 보상 보험 요율은  노동부에서 고시한 보험 요율에 따른다.

사) 안전관리비는 노동부 고시에 의한 국토교통부 표준안전관리비 산정기준에 따른다.

제5장  설계도서 납품목록

○「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시 제2020-635호」   별표2의 단계별 도서 내용의 도서 작성 구분 중 중급을 기준으로 하되 발주처와 협의하여   부분적으로 항목 증감할 수 있다.(아래 목록은 USB로도 제작․ 제출, 납품도서는 별도 협의)

1. 계획설계 납품도서

구분	설계도서명	내 용	규격	수량	단위	비고
1	계획설계(안)	건축주의 요구사항 수용여부와 설계방침의 확정	A3	3	부
2	법규검토	제반 법규검토,인허가절차 파악	A4	3	부
3	계 획 서	설계방향 확정, 건축주 요구사항의 수용여부와 기계설비 계획개요	A3	3	부
4	계 획 서	설계방향 설정,건축주의 요구사항 수용여부와 전기설비계획 개요	A3	3	부

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면(지정)	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	완료보고서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
4	계 산 서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내 역 서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	표준시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	전문시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	조 감 도	A2	2	부	◯							컬러(표구)
14	공 정 표		5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
15	CD		1	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
16	USB		1	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
17	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(Excel 및 xml file) 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등
18	건축물에너지효율 1등급 취득확인서		1	식
19	기타 발주기관 요구 사항

* 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

* 위 제출목록 전부를 CD(USB)로 제작하여 제출

나. 완료보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정·보완 지시사항 및    조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리    계획서, 납품설계도서 목록 등을 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면   인쇄하고 좌철 하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성·제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD(USB)에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

마. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

바. 기타 발주자가 요구하는 성과품.

사. CD의 캐드도면은 레이어를 해체하여 원본 그대로 납품한다.(추후 시공사 등  이 설계변경을 원활하게 할 수 있도록)

3.  행정절차 이행도서

가. 실시설계 납품도서 납품 이전 발주처에서 요구하는 행정절차 이행을 위하여 각 도서의 2부는 별개로 납품하여야 하고 변경사항이 있는 경우 이를 반영하여 실시설계 납품도서를 납품한다.

나. 도서의 양과 납품 시기는 발주처와 협의에 따라 조정할 수 있다.

[붙임 1]

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용 역 명 : 서천군 공유농업가공센터 신축공사 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 2023년     월    일

4. 착수일자 : 2023년     월    일

5. 완수예정일 : 2023년     월    일

가. 성   명 :

나. 주   소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2023년     월      일

계 약 자

주소 :

상호 :

대 표 자 :                    (인)

서천군수 귀하

[붙임 2]

보 안 각 서

1. 용 역 명 : 서천군 공유농업가공센터 신축공사 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 2023년     월    일

4. 착수일자 : 2023년    월    일

5. 완수예정일 : 2023년     월    일

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 서천군의 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 취득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2022년   월    일

주소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성명 :                   (인)

서천군수 귀하

[붙임 3]

(계획, 기본, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 : 서천군 공유농업가공센터 신축공사 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 2023년     월    일

4. 착수일자 : 2023년     월    일

5. 완수예정일 : 2023년     월    일

붙  임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 기본, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2022년    월     일

계 약 자

주소 :

상호 :

대 표 자 :

서천군수 귀하

[붙임 4]

주간 공정보고

□ 용 역 명 : 서천군 공유농업가공센터 신축공사 기본 및 실시설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2023년  월  일 ～ 2023년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(2023. . .)	금주예정사항(2023. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주소 :

상호 :

대 표 자 :

책임기술자 :                      (인)

서천군수 귀하

[붙임 5]

월간 공정보고

□ 용 역 명 : 서천군 공유농업가공센터 신축공사 기본 및 실시설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2023년  월  일 ～ 2023년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (2023. . . ～ 2023. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주소 :

상호 :

대 표 자 :

책임기술자 :                     (인)

서천군수 귀하

[붙임 6]

하도급승인 요청서

1. 용 역 명 : 서천군 공유농업가공센터 신축공사 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 2023년     월    일

4. 착수일자 : 2023년     월    일

5. 완수예정일 : 2023년     월    일

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2023년     월     일

계 약 자

주소 :

상호 :

대 표 자 :

서천군수 귀하

[붙임 7]

특정자재 사용 목록

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   사업책임기술자  ○ ○ ○ 서명

* 1. 관급자재 제외,   2. 품목당 100만원 미만 제외

[붙임 8]

예  정  공  정  표(예시)

○ 용 역 명 : 공유농업가공센터 신축사업 기본 및 실시설계 용역

공기월 공정별	착 수 일 로 부 터 180 일															진도율	비 고
	10일	20일	30일	50일	60일	70일	80일	90일	100일	110일	120일	130일	140일	150일	180일	%
1. 현황조사
2. 계획설계
3. 중간설계
4. 실시설계
5.납품확인
6.인‧허가 및 인증 협의
7.설계도서 납품 및 준공
계																100%