- 함양군 마천면 기초생활거점조성사업 -

건축설계 용역 과업설명서

2025.  8.

	한국농어촌공사 거창□함양지사

-  목    차  -

제1장 총칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 내용	1

제2장 과업의 일반사항

1. 과업수행의 기본방향	4

2. 용역수행자의 책임 및 의무	5

3. 과업의 수행절차	8

4. 기타	11

제3장 일반지침

1. 적용기준	14

2. 계획설계	15

3. 중간설계	15

3. 실시설계	16

제4장 기술지침

1. 공통 설계지침	18

2. 분야별 설계지침	20

제5장 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항	39

2. 성과품의 작성	40

3. 성과품의 납품시기	43

4. 기타	44

제6장 납품목록

1. 계획 및 중간설계 납품도서목록	46

2. 실시설계 납품도서	47

[붙임] 붙임 서류

제1장 총  칙

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『마천면 기초생활거점조성사업 건축설계 용역』이라 한다.

2. 과업의 목적

가. 마천면은 함양군 농촌생활권의 하위거점에 해당하는 지역으로 교통·상업 등 다양한 기능시설이 입지해 있으나, 함양군 11개 읍면 중 3번째로 많은 기능시설을 보유하고 있으나 기능시설 절반이 지리산 관광객들을 위한 도소매점, 팬션 등으로 주민들을 위한 보육·문화·복지 등의 기능시설이 부재한 지역으로 주민들의 문화·복지 증진을 위한 시설의 도입 필요

나. 따라서 마천면 기초생활거점조성사업의 일환으로 마천면사무소와 주민자치센터가 입지한 지역에 ‘마천 다랑복합센터’를 건립하여 지역 주민을 대상으로 하는 문화･복지 프로그램을 확대하고 지역 단체 및 동아리 활동 및 배후마을 서비스 전달 등 복합적인 기능을 수행할 수 있는 지역 대표 거점시설로 조성하고자 함

3. 과업의 내용

가. 과업의 개요

1) 건축개요

구 분	내 용
대지위치	경남 함양군 마천면 가흥리 515 외 2필지
지역지구	계획관리지역, 지구단위계획구역(마천가흥지구)
대지면적	887㎡
건축면적	522㎡
연 면 적	810㎡
규 모	지상 3층
주차대수	16대
용 도	제1종 근린생활시설 (주민공동이용시설)

※ 시설용도별 면적, 층별 배치, 건축규모 등은 설계과정에서 한국농어촌공사(발주처), 설계자(계약상대자)와 협의하여 조정될 수 있다.

2) 추정 공사비 : 금 2,851,000,000원 (부가가치세 포함)

- 예정공사비는 건축(철거 포함), 토목, 조경, 기계, 구조, 전기, 통신, 소방, 관급자재, 폐기물 처리, 부지조성 등에 대한 총공사비이며, 전기·가스·수도·우·오수 등 인입비 및 분담금이 포함된 금액이다.(용지매수비, 부대비용 제외)

- 용역수행자(계약상대자)는 예정공사비를 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

- 추후 발주청의 사업계획 변경에 따라 조정될 수 있으며, 용역수행자는 이를 반영한 설계를 시행하여야 한다.

4) 용역비 : 금 144,064,000원 [제2종(보통)/중급 적용]

※ 설계용역비 안에는 각종 인증(BF인증, 지능형건축물) 취득을 위한 업무대행비, 예비인증수수료, 손해배상보험료, 부가가치세 등 포함

5) 과업 수행기간: 착수일로부터 240일 (공휴일 포함)

※ 과업기간의 연장: 다음과 같은 부득이한 경우에는 과업 수행기간을 변경할 수 있다.

「지방자치단체 용역계약일반조건」(행정안전부예규 제404호, 2012.03.22.)

- 제6절 과업내용의 변경 및 계약금액의 조정

- 제7절 2. 계약기간의 연장

- 제7절 6. 용역의 일시정지

- 기타 천재지변 등의 요인으로 용역과업 수행이 불가능 할 때

나. 과업의 범위

1) 본 과업은 마천면 기초생활거점조성사업 마천 다랑복합센터 건립 건축설계용역(중간 및 실시설계)에 적용하며 건축협의 등 각종 인·허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 본 사업부지에 건축물 건립에 따른 도시계획시설사업의 실시계획(변경)인가 및 인·허가 처리(설계용역성과물은 제반 인·허가를 득한 성과물이어야 한다)를 포함한다.

가) 사전조사 업무

용역수행자는 용역착수 전 현장을 답사하고 해당 인·허가 관청을 방문·협의하여 관련 법규, 해당 지자체 조례 및 규제사항 등을 면밀하게 분석하여 본 과업의 인·허가를 취득하기 위한 선결 조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

나) 설계 업무

중간설계, 실시설계 단계의 과업과 더불어 발주기관에서 계획하는 추진일정에 맞추어 설계안정성 및 각종 심의, 인·허가 등을 위한 설계내용의 설명, 자료보완[조감도 등], 보고, 관계기관 협의, 회의 참석, 각종 자료 작성 등에 관한 업무를 수행하여야 한다.

다) 일체 인·허가 업무

- 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대관 인·허가는 용역수행자가 대행하여야 하며, 대관 인·허가, 각종 심의 등에 필요한 서류작성 등의 업무를 수행하여 인·허가를 득하여야 한다.

- 용역수행자는 본 용역이 완료 전·후라도 관청 인·허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

2) 공종별 모든 과업물의 세부 협의는 발주기관과 하며, 마천면 기초생활거점조성사업 주민위원회 회의 및 사업설명회 등을 통해 최종안을 확정하며, 전 과정은 회의록을 작성하여 제출한다.

3) 설계도서 납품 후 일상 감사 및 계약심사 등에 지적된 사항에 대하여 납품 완료 후에라도 보완하여 성과품을 제출한다.

4) 설계용역 진행과 관련하여 「공공부문 건축디자인 업무기준」제2장에 의거하여 공공건축가의 의견에 대해 적극 반영한다.

※ 전문가 활용

- 계약상대자는‘공공부문 건축디자인 업무기준의 공공건축가 활용 의무화’에 따라 건축물과 공간환경의 디자인 관리에 대해 자문을 받아야 하며 발주기관이 위촉한 공공건축가가 해당 용역에 참여할 수 있도록 한다.

- 전문가(공공건축가 포함)를 통해 자문을 받는 경우 설계내용에 반영하고 자문회의록은 전문가의 서명을 날인하여 계획, 중간 및 실시 설계보고서 부록에 첨부한다.

제2장 과업 일반사항

1. 과업수행의 기본방향

가. 용어의 정의

1) 발주기관

‘발주기관’이라 함은 해당 용역의 시행 주체인‘한국농어촌공사 거창·함양지사’를 의미한다.

2) 용역수행자

‘용역수행자’라 함은「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제14장제1절제3호의‘계약상대자’를 의미한다.

3) 감독관

‘감독관’이라 함은 용역수행자가 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘 및 감독할 수 있는 자로서 우리 공사가 임명·통보한 직원을 말한다.

나. 일반사항

1) 용역수행자는 본 과업설명서의 문구 해석상 계약상대자 간 차이가 있을 경우 및 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 용역수행자 임의로 판단해서는 안되며, 발주기관과 협의를 통해 이행한다.

2) 본 과업설명서에 규정되지 않은 사항은 발주기관의 관련규정 및 정부관련 법령 및 정부제정 각종 시방서·규정 등에 따라 발주기관과 협의하여 수행하여야 하며, 단 분야별 내용이 상충될 경우에는 그 규정이 강화된 것을 우선한다.

3) 그 외 명시되지 않은 계약에 관한 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 등에 따른다.

4) 본 용역의 준공 이후 저작권 및 사용권 등 모든 법적 소유권은 발주기관에게 귀속된다.

다. 감독관(발주기관)

1) 감독관은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 용역수행자에 대하여 다음의 계약 관련 업무 내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 용역수행자는 이에 적극 협조하여야 한다.

- 기술인력 동원현황

- 각종 도서 작성현황 및 공종별 업무수행상태

- 기타 확인이 필요한 사항

2) 용역점검

감독관은 용역품질 확보를 위해 용역수행자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 용역수행자는 감독관과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

2. 용역수행자의 책임 및 의무

가. 용역수행자의 책임 및 손해배상

- 설계의 책임 및 손해배상은 관계법령에 의한다.

- 본 과업수행에 있어 일어나는 모든 사고는 용역수행자가 책임을 진다.

- 용역수행자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호 간의 모순, 건축협의 불가, 구조적 모순, 관계법령 위반 등)로 인하여 발생하는 인명피해, 재산상의 손실, 기타 공사 진행상 초래되는 문제점 등 모든 사항에 대하여「건축사법」제20조(업무상의 성실 의무 등)에 의한 설계변경, 손해배상 등을 포함한 일체의 책임을 져야하며, 「같은 법 시행령」제21조(건축사의 보험 또는 공제 가입)에 따라 손해배상 보험증서 또는 공제증서를 제출한다.

- 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 설계도서의 성과로 첨부된 경우도 위와 같다.

- 용역완료 후에도 공사 중 발생하는 설계도서에 관한 문의 및 질의사항에 대해 적극적으로 협조(답변서 제출 등)한다.

- 용역 완료 후에도 위 사항에 대한 발주기관의 수정·보완요구가 있을 때에는 용역수행자의 부담으로 이행한다.

- 계약의 수행 중 계약당사자 간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁 기간 중이라 할지라도 용역수행자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

나. 문서기록 및 설계보완

- 본 과업수행에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성 및 비치하고 발주기관의 제출요구가 있을 경우 이에 따라야 한다.

- 용역수행자는 완성된 설계도서에 대하여 관련법규에 따른 협의, 심사, 감사 등의 행정절차 이행 시 지적된 사항에 대하여 적극 협조하여 수정 및 보완하여야 한다.

다. 보안 및 비밀유지

- 용역수행자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 보안사항 불이행으로 인한 모든 책임을 져야 한다.

- 용역수행자는 보안대책을 수립하여야 하며 착수계와 함께 용역수행자 보안각서와 용역참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 용역참여자가 교체될 시에도 동일하다.

- 용역수행자는 본 과업을 수행함으로써 발생되는 자료 및 내용 등을 발주기관의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안된다.

라. 용역수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력·경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관이 과업수행에 부적격하다고 판단되는 경우 교체를 요구할 수 있으며 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2) 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 또는 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생했을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자 또는 그 이상으로서 발주기관의 승인을 받은 후 교체해야 하며, 교체에 소요되는 기간으로 인하여 과업수행에 지장을 주어서는 안된다.

마. 과업내용의 변경 및 계약취소

1)「일반용역계약특수조건」제9조(과업내용의 추가, 변경 및 해석)에 따라 설계 중 발주기관이 별도의 지침에 의하여 과업지시를 할 수 있으며, 용역수행자는 이에 응해야 한다.

2) 발주기관은 용역수행자가 다음과 같은 경우 발생 시 본 과업용역을 일방적으로 해약할 수 있다.

- 정당한 사유 없이 약정한 착수시기를 경과하고도 과업에 착수하지 않을 경우

- 본 과업설명서 및 발주기관의 정당한 지시사항에 대하여 이행치 않을 경우

- 계약자의 귀책사유로 인하여 발주기관 계획에 중대한 차질이 유발될 것으로 판단될 경우

- 계약자의 고의 또는 부주의로 설계도서 내용이 공개되거나 제반 보안 규정을 준수하지 않을 경우

- 기타 계약 조건을 위반하였을 경우

바. 용역 중지

- 용역수행자의 귀책사유가 아닌 인·허가 지연, 민원 발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청 기간 소요 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독관은 용역 중지를 명할 수 있다.

- 과업수행 중 정책변경, 기술심의, 경관심의 등 불가피한 사유 발생 시 발주기관은 본 용역을 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며, 과업이행요청서의 문구 해석상 계약상대자 간 차이가 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고 기타, 명시되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관이 정하는 바에 따른다.

- 수요조사, 주민의식조사, 사업타당성검토 등을 통하여 더이상 과업을 진행할 수 없는 것으로 판단되는 경우, 이때까지의 공정률을 근거로 타절 준공한다.

사. 설계변경

1) 발주기관은 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 용역수행자는 이에 따라야 한다.

- 상위계획 또는 발주기관의 계획변경으로 인하여 과업 범위가 변경될 때

- 지자체 또는 관계기관과의 협의 내용 반영을 위한 과업 내용 변경 시

- 용역수행자의 귀책사유가 아닌 용역의 중지 등에 따른 과업 기간의 연장

2) 발주기관의 요구에 의하여 과업 범위의 증감이 발생할 경우 예산의 범위 내에서 당해 계약금액을 조정 또는 정산한다. 과업 범위의 현저한 변경이 없이 계획 및 중간설계 또는 실시설계 결과 과업제시기준 공사비를 초과한 범위에 대하여는 용역비의 증액 지급이 불가하다.

아. 주요 업무의 사전승인 등

1) 용역수행자는 다음 사항에 대하여는 발주기관의 승인을 득한 후 과업을 수행하여야 한다.

- 착수보고서 내용의 변경

- 주요 설계내용의 변경

- 자문 및 관계기관과의 협의 사항

- 기타 감독관이 요구하는 사항

2) 용역수행자는 예정일정표에 의하여 실시설계를 추진하되 과업 진행 전반에 걸친 사항을 본 발주기관과 수시로 협의하고 협의한 내용을 설계에 성실히 반영하여야 한다.

자. 하도급의 범위

1) 용역수행자는 본 과업을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급 처리 가능 사항

- 건축 구조 및 가설 구조[흙막이 가시설, 비계, 동바리 등], 토목 구조, 조경, 기계설비, 통신, 전기 등 전문 분야 업무

- 각종 공사내역서 작성[수량산출, 단가산정 등]을 위한 업무

- 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

3) 하도급에 의한 성과품에 관한 책임 사항은 용역수행자에 있다.

4) 용역수행자가 본 용역의 일부를 하도급 할 경우 사전에 하도급자에 관한 사항 및 계약 내용을 발주기관으로부터 승인을 득하여야 한다.

3. 과업의 수행절차

가. 착수계 제출

용역수행자는 용역계약일반조건 제13조에 따라 계약상대자는 과업 착수 시 관련 법령에서 정한 서류와 다음 각호의 사항이 포함된 착수신고서를 계약일로부터 7일 이내에 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 사업자등록증, 건축사 면허증, 건축사업무신고필증 사본

2) 사용인감계 및 인감증명서, 법인등기부 등본

3) 공종별 책임기술자 선임계(재직, 경력증명서, 기술자면허수첩 사본)

4) 분야별 참여기술자 투입 계획

5) 설계용역 수행 조직표(연락처 기재)

6) 설계용역 예정 공정표(분야별 세부공정계획서 및 업무 흐름도)

7) 설계용역비 산출내역서(각 분야별로 작성)

8) 분야별 참여기술자 보안각서

9) 하도급현황(공동도급 수급체 구성원은 하도급 대상 아님)

10) 설계용역 계약서 사본(분담이행 협약서 등)

11) 기타 발주기관이 필요하다고 판단되는 사항

나. 보고회

책임기술자는 착수보고서 및 과업수행계획서 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 보고해야 한다.

1) 착수보고회

가) 용역수행자는 현장여건 등을 검토한 후 용역착수 후 14일 이내에 착수보고를 하여야 한다.

나) 착수보고는 사업 책임기술자가 직접 보고하되, 설계계획서 내용을 중심으로 세부 과업수행계획을 보고하여야 한다.

2) 중간보고(회)

중간보고는 계획 및 중간설계가 완료된 후 기본 설계안을 바탕으로 해당 부서 및 관계자와의 협의를 통해 주민 요구사항을 최대한 반영할 수 있도록 하며, 각종 행정절차의 진행계획을 설명한다.

3) 용역준공 전 최종보고회

용역수행자는 용역준공 15일 전까지 용역수행 결과를 종합하여 용역준공 전 최종보고하며, 사업 책임기술자가 직접 보고하여야 한다.

※일정은 추후 발주기관과의 협의 하에 변경 가능

다. 업무 보고

1) 월간보고

용역수행자는 과업수행 기간 중 다음 사항을 포함한 월간 진도보고를 매월 말일을 기준으로 다음 달 3일까지 분야별 용역감독관을 경유하여 서면으로 보고 하여야 한다.

- 과업추진내용 및 공정현황

- 각종 문서수발 현황

- 과업수행 상 중요 문제점 및 대책

- 참여기술자 현황

- 다음 달 과업수행계획

2) 수시보고

가) 용역수행자는 감독자의 요구가 있거나 과업수행 중 해결하여야 할 중요한 문제가 발생(주요계획 및 방침의 결정과 변경)시 또는 조사 및 자료수집 완료와 공법결정시 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 한다.

나) 감독자의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

3) 주민설명회

감독관의 요청 시 주민설명회를 개최하여야 한다(지역주민 등에게 건축설계 내용 설명 및 보완사항 검토).

라. 업무 협의

용역수행자는 설계 진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

※ 주민의견을 수렵하여 디자인을 도출하여야 하며, 주민의견 수렴 방법에 대해서는 주민협의체의 의견을 존중하여 결정하여야 한다.

1) 수시 회의 (지역협의체 회의)

설계 진행 시 문제점이 발생하거나, 지역협의체 주민위원의 요구에 따른 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 하며 지역협의체 보고 회의는 상호 간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

2) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 용역수행자는 발주기관과 협의하여 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석하도록 하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

마. 업무보고 및 회의내용의 기록

각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관 및 지역협의체 사무장에게 제출하여야 한다.

바. 완료계 제출

용역수행자는 업무완료보고 후 설계용역 완료보고서, 손해보험 또는 공제가입 증서, 최종성과품을 첨부하여 완료계를 제출하여 승인을 받아야 한다.

4. 기타

가. 용역수행자문 및 각종 심의

1) 용역수행자는 본 과업수행 기간 중 발주기관이 실시코자 하는 설계사항에 대하여 공공건축가 등 자문에 필요한 자료 준비 및 협조를 하여야 한다.

2) 공공건축가의 자문사항에 대해서는 검토 후 설계에 반영 여부를 발주기관에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

3) 각종 심의 지적사항에 대하여는 검토 후 반영 여부를 발주기관에 제출하여 승인을 받도록 한다.

4) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요한 경우 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 용역수행자가 준비하여야 한다.

5) 용역수행자는 본 과업과 관련된 해당 심의(자문)위원회 개최 등 발주기관의 요구가 있을 시 참석하여 설명하고, 각 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변토록 하여야 한다.

나. 관련기관 인·허가 및 협조

1) 용역수행자는 계약 후 7일 이내에 건축물(허가, 신고, 산지전용 등) 인·허가에 문제가 없는지를 조사, 법적검토를 하고 그 결과를 감독에게 보고하여야 한다.

2) 용역수행자는 설계도서 납품 전에 관련법규에 의한 건축협의 등 각종 인·허가를 완료하고 협의결과에 대한 사항을 반영한 후 납품하여야 하며, 건축 인허가 및 제반 인허가에 소요되는 비용은 용역수행자 부담으로 시행하여야 한다(면허세 등 소유주 및 지자체가 부담해야 하는 비용은 발주기관에 보고하여 사업추진이 원활하게 한다).

3) 본 용역 기간 중에 시행하는 각종 평가, 심의, 설계의 경제성 등 관련법 이행이나 행정절차가 필요한 경우 감독원의 요구에 따라 이행하거나 자료를 제출하여야 하며 비용은 용역수행자가 부담한다.

다. 조사 및 자료수집

1) 현지조사

가) 현장조사

용역수행자는 현지의 지형, 지세, 경사도, 수목, 매설물, 지상과 지하구조물, 자연환경, 소음ㆍ진동 등을 조사하고 2면 이상에서 사진 촬영한다.

나) 도시기반시설 조사

전기(소방), 통신, 상하수도, 오폐수처리방법, 가스, 교통(도로 등), 냉ㆍ난방 등의 시설과 인입비용 등 공사에 필요한 사항 일체를 조사한다.

다) 인접 지역 조사

주변 건축물 현황, 인접 공사장, 민원 예상현황, 토취장, 사토장, 각종 장비와 자재(폐기물, 흙 등) 운반로 등을 조사한다.

라) 필요 시 폐기물 등을 조사한다.

2) 각종 서류조사

가) 토지대장, 지적도, 등기부등본, 도시계획확인원, 지방자치단체조례 등을 조사한다.

나) 기존 건물의 증축 시는 기존 건물 및 부속시설에 대하여 조사한다.

다) 유사건축물의 공사비, 평면, 입면 등 계획에 필요한 사항을 조사한다.

3) 측량 및 지반 조사(필요시)

가) 측량은 측량법과 공공 측량 작업 규정에 관한 기준에 의거 시행하여야 한다.

※ 대상 건축물(리모델링, 증축의 경우 기존 건축물 포함)의 현지 측량 및 구조적 안전성 검토한다.

나) 용역수행자는 측량 실시 전 작업계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

다) 작업계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 조사물량

② 작업계획표(외업, 내업)

③ 인원편성

④ 주요기기

⑤ 특기사항(안전관리, 사진촬영)

⑥ 위치도

⑦ 기타

라) 용역수행자는 작업의 진행 상황을 작업일지에 기록하여 필요 시 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다.

마) 측량기구는 각 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며 수시로 점검 및 보정을 받은 것이어야 한다.

바) 용역수행자는 측량작업 시 안전사고에 유의하여야 한다.

사) 측량작업 시 필요한 관계기관의 제수속은 용역수행자 부담으로 신속히 처리한다.

아) 대지경계측량 및 실측은 정밀측량을 실시하고 부지면적과 정확한 현황을 도면으로 작성하여야 한다.

자) 주요 측량원점에는 필히 지반고를 기입하고 삼각점 및 주요 수준점 조서를 작성하며 감독관이 필요하다고 인정되는 지점에는 표석을 매설하여 영구보존할 수 있도록 하여야 한다.

차) 용역수행자는 지반조사를 실시하며 과업내용에 명시되지 않은 사항은 토질 및 암석시험 규정, 한국산업규격 및 기타 관련규정에 따라 시행하여야 한다.

4) 통계자료의 사용

통계자료는 그 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용하여야 하며, 다음 각 호의 순서로 활용하고 자료의 출처를 명확히 하여야 하며 자료가 원문일 경우에는 번역 공증기관의 번역서를 첨부하여야 한다.

가) 기획재정부 통계자료

나) 국토교통부 등 정부기관 통계자료

다) 과업대상 사업지구 관할지자체 통계자료

라) 기타 공공기관 통계자료 및 현지 조사결과

제3장 일반지침

1. 적용기준

용역수행자는 설계내용이 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법, 해당 지자체의 조례, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 측량·수로조사 및 지적에 관한 법, 환경영향평가법, 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 등 기타 관련법규 및 제반 규칙 등 관계법령에 위배․저촉되지 않고, 아래의 사항들을 반영하여 설계용역 과업을 수행 하여야 한다.

가. 『장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률』 관계 규정에 적합하도록 설계되어야 한다.

나. 주변 건축물 및 경관과의 안전성, 조화성을 고려, 지역 자원 및 경관을 고려한 창의적인 디자인으로 건축물의 미적요소를 갖추고 안정성, 경제성, 시공의 난이성 및 기능의 합리성이 검토되어야 하며 조형미의 구현에 합당하도록 설계하여야 하나 지나친 외관치장을 가급적 피한다.

다. 대상 부지 여건과 인접 건축물을 고려하여 접근성을 향상할 수 있도록 하며 건물 신축에 따른 교통량 증가에 의한 교통안전도 고려토록 한다.

라. 본 사업 집행이 예산 범위 내에서 집행될 수 있도록 적정하게 설계하여야 한다.

마. 기능, 유지관리 등 문제가 없도록 설계에 철저를 기한다.

바. 각 분야별(건축, 토목, 조경, 전기, 소방, 통신, 설비 등) 용역수행자는 상호 긴밀히 협의하여 시공, 기능, 유지관리 등 문제가 없도록 설계에 철저를 기한다.

사. 에너지 절약방안으로 냉․난방설비의 효율을 높이고 건축물의 바닥, 천장(최상층), 외벽 및 외부에 면하는 창 등은 관계 규정에 적합하도록 단열처리로 설계되어야 한다.

아. 기계실, 물탱크실 등 관련 시설 등은 근접 배치하되 기계실, 공동구, 파이프덕트 등의 면적 및 층고는 관계법령, 시공, 유지관리 등을 고려하여 충분히 확보토록 한다.

자. 열원 공급실은 가능한 건물의 중심부에 배치하여 열손실 방지 및 유지관리가 편리하도록 한다.

차. 대상 사업지의 기초생활거점조성사업 기본계획서를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

2. 계획설계

가. 정의

"계획설계"라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

※ 본 과업의 계획설계는 중간설계에 포함하여 계획한다.

나. 일반사항

1) 용역수행자는 대지의 주변상황을 참고로 하여 계획설계를 진행하고 필요시 대안을 제시하여 발주자의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

2) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 용역수행자는 즉시 보완 제출하여 발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

3) 설계대상이 되는 건축물의 공사비예산을 확정하기 위해 유사 규모 건축사례 조사 및 공사비 적정성을 비교 검토하여 개략설계에 따른 공사비를 산출한다.

4) 용역수행자는 과업수행 체크리스트와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을 작성하여 제출하여야 한다.

다. 설계서 구성

제출 도면은 건축사법에 의한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준”[별표2]에 의한 계획설계의 도서 내용을 참고하여 성과품을 작성하여 제출한다.

3. 중간설계

가. 정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정·보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요 기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계 기준을 제시하여야 한다.

4) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주자의 승인을 받는다.

다. 설계서 구성

제출 도면은 건축사법에 의한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준”[별표2]에 의한 중간설계의 도서내용을 참고하여 성과품을 작성하여 제출한다.

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

제출 도면은 건축사법에 의한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준”[별표2]에 의한 실시설계의 도서내용을 참고하여 성과품을 작성하여 제출한다.

제4장 기술지침

1. 공통 설계지침

가. 기본 개념

본 설계용역의 최종 성과물이 실현되었을 때 이용자 주민의 needs에 부합하고, 수요기관의 기능을 원활하게 수행하며, 유지 관리상의 경제성과 구조적으로 안전성, 내구성을 가지며 주변 건축물과의 접근성 및 주변환경에 조화되어 미관, 환경 등의 모든 요건을 만족하도록 한다.

나. 공간의 배치 및 크기

총칙에서 제시한 공간의 크기, 위치, 소요 수량, 성능 등은 최소치를 제시한 것으로 공간의 배치에 있어 충분히 수용하며 인접한 주민자치센터와 연계할 수 있도록 계획하고, 용역수행자는 필요시 이에 대한 대안을 제시하여 발주기관과 협의 후 채택할 수 있다.

다. 시각적 형태

1) 건물의 층수 : 주변 건축물과의 조화성 및 건물의 기능을 고려하며 주위 환경과 스카이라인을 고려

2) 건물의 외형 : 자연, 지역경관과 조화될 수 있는 형태로 변화성을 추구

3) 건물의 층고 : 각 층의 용도에 따라 조정하며 구조에 따른 유효공간과 활동 내용에 따른 인체 동작, 공간밀도에 따른 적정환경 및 경제성 고려

라. 설계지침

1) 기능성, 경제성의 고려

가) 수요기관의 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 주민자치센터와 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻도록 설계하여야 한다.

나) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용, 방법 등을 고려한 경제적인 건축물이 되어야 한다.

2) 구조적인 안전성 및 내구성

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제 상태에 따라 하중, 토압, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한다.

나) 지반조사 보고서의 결과를 기초 및 지하구조물에 적절하게 반영한다.

3) 미관 및 친환경적 설계

가) 주변 환경에 적합하고 독창성 있는 미적 감각을 지닌 건축물로 설계한다.

나) 기존부지의 수목, 주변 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사이행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 한다.

다) 인체에 유해한 자재(석면 등)와 에너지 다소비형 자재의 사용을 억제하고, 에너지 저소비형 자재를 사용한다.

4) 단열ㆍ보온ㆍ결로에 대한 계획(필요시)

녹색건축물 조성 지원법 제14조(에너지절약계획서의 제출)와 건축물의 에너지절약 설계 기준에 적법하게 설계한다.

5) 채광ㆍ조명ㆍ환기 계획

남향으로 최대한의 자연채광과 적정한 조도, 환기로 재실자의 보건과 위생에 지장이 없도록 설계하며, 에너지 효율에 대한 측면이 고려되어야 한다.

6) 방재 및 보안계획

화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안이 용이한 구조로 설계한다.

7) 쾌적성 및 편리성

냉ㆍ난방 환기가 원활하여 사용자의 보건과 위생에 지장이 없고, 장애인, 노약자, 임산부가 이용하기에 편리한 구조와 시설로 설계한다.

8) 품질 및 안전관리계획

품질 및 안전관리비 등은 건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리) 및 같은 법 시행규칙 제53조(품질관리비의 산출 및 사용기준)와 제60조(안전관리비)에 규정대로 작성 후 건축, 전기, 통신으로 분류하여 작성하고 해당 규정에 적합하게 시방서에 명기하고 필요한 비용을 명세에 반영한다.

9) 기타

가) 다랑복합센터는 문화·복지기능의 주민공동이용시설로 마천면의 핵심거점시설이므로 주민자치센터와의 연계 및 주민 접근성을 고려하고 마천면을 상징하는 대표시설이 될 수 있도록 계획한다.

나) 다랑복합센터는 마천면의 모든 연령층이 이용하는 시설로 어린이, 노약자, 장애인 등 사회적 약자를 고려한 시설계획을 기반으로 공간을 계획하여 주민들의 편리한 이용을 도모한다.

다) 다랑복합센터의 향후 운영 및 유지관리 비용을 절약할 수 있는 고효율 설비를 적용할 수 있도록 한다.

라) 다랑복합센터 신축에 따른 교통량 증가에 의한 교통안전을 고려하여야 한다.

라. 관계기술자의 협력

건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

2. 분야별 설계지침

가. 건축 분야

1) 일반 사항

가) 전체 공사비용이 예정공사비 내에서 이루어질 수 있도록 계획하고, 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화되도록 기본조사 내용을 반영하여 설계하여야 한다.

나) 각종 공공건축에 해당하는 법적 의무 인증(장애물 없는 생활환경 인증, 건축물에너지효율등급 1++ 이상, 제로에너지건축물 5등급 이상)을 모두 충족할 수 있는 계획이어야 한다.

다) 설계도서에 요구되는 성능과 재질을 구체적으로 명시하여야 하나, 특정제품의 명칭, 사양을 명시하여서는 안 된다.

라) 건축물 외관, 옥외시설물·조경은 주변 경관과 어울리게 하여야 하고, 인접 건축물의 직․간접적인 피해가 발생하지 않도록 주변 환경을 철저히 조사․분석하여 공사과정의 민원이 최소화되도록 소음·진동·분진 등에 대하여 구체적인 저감 방안을 마련하는 등 공사관리계획을 수립하여야 한다.

마) 공사 중 지역 주민들의 안전한 보행환경 확보 대책을 마련하여야 한다.

바) 지반조사 결과를 토대로 토공사 및 지하 기초공사 비용이 과다 투입되지 않고, 경제성과 안전성을 종합적으로 고려하여 합리적으로 설계하여야 한다.

사) 건물구조는 공사기간과 예산을 고려하여 용도에 가장 적합한 것을 원칙으로 하되, 각종 심의 등을 반영하여 용역수행자가 가장 좋은 방안으로 변경할 수 있다.

아) 실내․외 주요 마감재의 결정은 발주청의 승인을 득하여 계획에 반영토록 하고, 친환경 자재를 적극 검토하여야 하며, 유지 관리비가 적게 들고 내구성이 좋으며 준공 후 자재의 대체구매 용이성을 자재 선정시 우선 고려하여야 한다.

자) 국산자재를 우선적으로 검토하여야 하며, 부득이한 경우 경제성 등을 객관적으로 면밀히 검토하여 발주청의 승인 후 수입재를 설계에 반영할 수 있다.

차) 마천면 거점지 거점시설로서 지역의 특성을 반영하고 사업추진과정에서 이용주체인 지역주민 참여보장과 의견 반영을 위해 설계과정에서 주민 의견 청취, 설명회, 실제 운영 담당 부서와 협의 등 소통과정을 지속하여야 한다.

카) 마천면 주민 의견을 수렴하여 창의적이고 합리적인 규모와 배치의 공간으로 조성하고 지역을 상징할 수 있는 이미지와 창의적인 디자인을 도입한다.

타) 시설 내 공간의 수요분석 및 운영주체와 협의를 통해 주 이용자에 따른 운영계획을 수립하여 그에 적합한 실구성과 규모 검증을 해야한다.

파) 녹색건축물 보급 및 활성화를 위한 정부정책에 맞추어 신재생에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력, 수소에너지 등)를 신재생에너지의 공급의무 비율 34%(’24~’25년 기준) 이상으로 설치 계획에 반드시 포함하여 계획하고, 도면에 표기하여야 한다.

하) 액티브 계획 및 건축물 에너지 소비량 저감을 위한 패시브 계획을 적극적으로 고려할 것을 권장한다.

※ 「신에너지및재생에너지개발‧이용‧보급촉진법」 제12조 및 동법 시행령 제15조 규정

2) 배치계획

가) 사업대상지에 존치되는 시설(주민자치센터)과 마천면 기초생활거점조성사업으로 동일부지에 집적화되는 시설(쉼터 등)을 포함하여 사업대상지 내 시설의 연계성과 접근성을 고려한 다양한 배치안을 도출하고 최적의 배치계획을 제시하도록 한다.

나) 다랑복합센터 대상지는 1면이 도로에 접하고 전후면 레벨 차이가 4~5m 정도이므로 예산절감 및 지형을 활용한 입체적 공간이 되도록 건물 배치에 대하여 창의적으로 제안할 것을 권장한다.

나) 건물 배치는 소음, 조망, 기후 조건, 대지 조건 등을 고려하여 적합한 계획안을 제시해야 한다.

다) 주변 환경과의 상호 관계를 적극적으로 검토하며, 교통체계와 주변 토지이용계획을 감안하고, 장래의 지역개발 방향과 토지이용변화를 수용할 수 있도록 융통성을 부여하여 배치한다.

라) 외부공간은 주요 이용자들의 접근이 용이한 진입구간에 광장 및 녹지 등 오픈스페이스로 적용하여 공공에 개방된 공간으로 계획하여 주민들이 소통할 수 있도록 유도하고, 사업목적 등을 감안하여 주민(부대)편의공간은 가급적 넓게 확보를 검토한다.

마) 외부공간 계획은 오픈스페이스의 유형(공개공지, 휴게공간, 광장, 녹지 등)과 지상 주차장 규모(교통약자, 전기충전소, 비상차량) 이외에도 기타 제안사항을 포함할 수 있다.

바) 차량 진출입구는 진출입 용이성 및 주변 교통을 감안하여 계획하고 대지로의 보행동선과 차량동선은 분리함을 원칙으로 하고 보행동선과 차량동선이 교차되는 지점에는 안전사고 방지 대책을 수립한다.

사) 아름답고 기능적인 조경이 이루어질 수 있도록 계획하고, 내외부 공간과 유기적으로 연계될 수 있는 휴게·녹지공간을 조성한다.

아) 조경, 보행로, 오픈스페이스, 옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 벤치 등)의 유니버설 디자인은 공공디자인 가이드라인과 통일성․일관성을 고려한다.

자) 이용자들의 안전하고 쾌적한 접근을 위하여 필요시 신호등 또는 횡단보도 신설 등에 대해 유관부서와 협의한다.

차) 건물의 진입동선 및 외부공간에 노약자를 고려한 편의시설(벤치, 그늘막, 안전난간 등) 설치를 검토한다.

카) 재난에 대비한 소방용, 비상용, 시설관리용 차량동선을 고려한 배치계획이 되어야 한다.

타) 향후 마천면의 지역 인구변화, 수요증가 등에 따른 증축 가능성을 고려하여 건축물을 배치한다.

3) 평면계획

가) 각 층별로 이용객 출입이 용이하도록 수직동선(계단 및 엘리베이터 등)을 확보하여 누구나 이용이 가능토록 하며, 접근성이 양호한 평면계획 및 동선계획을 하여야 한다.

나) 실의 형태 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치(장․단변비)는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획한다.

다) 각 시설은 관리 및 통제가 용이하도록 최소 인원으로 운영․관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 한다.

라) 각 시설별 영역은 운영시간, 운영주체 및 주이용 대상을 고려하여 분리와 연계가 가능한 효율적 공간계획이 되어야 한다.

마) 관리사무실은 1층에 배치하고 사무기기와 회의테이블 등이 배치된 사무공간으로 적절한 규모로 계획한다. 방문객의 편리한 이용과 사무실 직원의 근무여건을 개선할 수 있도록 휴게실, 야외 쉼터 등의 공간을 효율적으로 배치한다.

바) 공유주방은 조리 및 요리 교육 등의 활동이 이루어지는 공간으로 조리활동이 용이하게 이루어질 수 있도록 공간 및 급배수시설을 계획해야 하며, 내부 마감재는 오염에 강한 자재를 사용하는 것을 권장한다.

사) 다목적강당은 주민자치센터와 공동으로 이용하는 공간으로 단체 교육 및 회의, 넓은 공간이 필요한 생활스포츠 및 문화프로그램 운영, 소규모 주민행사 등이 복합적으로 이루어질 수 있는 공간이며, 그 인원과 활동 등에 따라 공간을 분리하여 가변적으로 활용할 수 있도록 한다(사용 목적에 맞는 층고 계획). 또한 다수의 인원이 동시에 진출입이 수월하도록 하고 음향장비와 물품보관을 위한 창고를 포함하여 계획한다.

아) 문화프로그램실은 이동식 책상과 의자가 배치된 공간으로 주민 대상 문화프로그램을 진행하고 필요시 회의 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

자) 돌봄방(동아리실)은 동아리 인원과 활동 등에 따라 공간을 필요에 따라 유연하게 사용할 수 있도록 계획한다.

차) 공용공간은 효율적인 구성으로 유지‧관리가 용이하고 충분한 채광과 환기가 가능하도록 계획하며, 공용공간 면적의 비율은 이용자의 편의성을 고려하여 30~40% 적용할 것을 권장한다.

카) 기계·전기실

a. 기계실 및 전기실 등은 효율적 운영관리를 위하여 적정한 공간으로 계획한다.

b. 일반이용자 동선과 구분하여 계획한다.

4) 내·외부계획

가) 건축물의 지상층에서 외부공간을 다양하게 활용할 수 있도록 옥상조경, 내·외부 테라스 등 각 층의 내부공간과 연계한 외부공간을 계획한다.

나) 외관은 주위 환경과 조화되고, 외장재는 친환경적이며, 유지관리가 용이하고, 화재 및 방수에 강한 자재로 설계한다. 또한 인접 건물 등을 고려하여 외부입면을 계획한다.

다) 건물유리창 빛 반사 방지, 에너지절감 등을 위해 전면유리로 된 커튼월구조는 지양한다.

라) 내부 마감재는 건물의 특성과 공간 및 사용자의 활동에 부합하여야 하며, 내구성, 유지보수성이 확보되어야 하고 대중의 사용에 적합하여야 한다.

마) 전체적으로 영구적이며 합리적인 구조로서 경제성과 안정감 있는 입면과 자연채광 및 환기 등 에너지 효율을 극대화할 수 있도록 계획한다.

바) 구조물의 안전 점검을 위한 점검구가 일정범위(구간, 간격)내에 포함될 수 있도록 건축마감 설계 시 고려하여야 한다.

사) 장애인의 출입은 관련 법규에 따라야 하며, 부지 내 시설과 외부공간의 레벨차, 턱을 최소화하여 편리하게 계획되어야 한다.

아) 건축물 및 외부공간은 환경설계를 통한 범죄예방(CPTED) 기법을 적용하여 안전하고 쾌적한 환경을 조성할 수 있도록 계획한다.

자) 국토부 범죄예방 건축 기준 고시, 경찰청 범죄예방을 위한 설계지침을 반영한다.

차) 옥상층에 설치하는 태양광패널은 자체적으로 디자인적 요소가 되도록 하거나, 건물디자인에 방해가 되지 않도록 계획한다.

카) 이용자 편의 증진을 위해 유니버설디자인(Universal Design)을 적극 반영한다.

타)「실내공기질관리법」 등 관련 법규를 검토하여 쾌적한 실내환경을 조성한다.

파) 야외에 쉼터 등을 조성하므로 시설 설치에 따른 안전관리 기준을 준수하여 보행동선을 계획해야 하며, 차량과 보행동선은 분리하여 계획할 것을 권장한다.

하) 주변 교통량 등을 고려한 보행자 안전을 우선으로 한 계획이 되도록 한다.

5) 외부 시설 계획

가) 외부 바닥, 현관 입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용하며, 외부로부터 우수 등이 실내로 유입되지 않도록 한다.

나) 환기탑, 환기구 및 환기 갤러리는 외기의 역류 및 눈비가 들어오지 않도록 하기 위해 개폐 장치, 후드(Hood) 등을 설치한다.

다) 루프 드레인(Roof Drain)의 수 및 구경은 최대 강수량 및 지붕 면적 등을 고려하여 여유를 둔다.

라) 조경, 보행로, 오픈스페이스, 옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 벤치 등)의 디자인은 통일성 및 일관성을 고려하여 조화를 이루도록 계획을 수립한다.

마) 외부 출입구에는 우수처리시설(트렌치 및 차수벽)을 계획하여 설치한다.

6) 구조 및 방재 계획

가) 구조 계획은 향후 수직증축이 가능할 수 있는 구조로 설계하여야 한다.

나) 구조 계획은 경제성, 안전성 및 시공성을 고려한 합리적인 계획이 되도록 한다.

다) 주요 구조부위 치수를 모듈화하고 건물 마감을 고려토록 한다.
(특히 계단, 경사로, 출입구 등 법적 기준 준수)

라) 태풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 풍하중에 대해 면밀히 검토하여야 한다.

마) 구조계산은 객관성이 있는 다음의 국내외 관계 최신 규준을 적용하여야 한다.

a. 건축구조기준(KDS 41) (국토교통부)

b. 콘크리트구조 설계기준 해설 (한국콘크리트학회, 2021)

c. 강구조 설계기준 및 해설 (한국강구조학회)

d. 건축물 내진설계기준 (KDS 41 17 00)

바) 구조 안전은 관련법에 따라 전문가의 확인을 받고, 사용하는 건축 재료의 품질은 관계법에 의거 공인된 것이어야 한다.

사) 구조물 취약부분은 별도의 보강계획을 명기한다.

아) EXPANSION JOINT 설치 시 이에 대한 방수처리 계획은 명기한다.

자) 주요부재의 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수 및 보조부재의 보강을 검토하여야 한다.

차) 구조기술사가 구조안전에 대한 안전성 검토(구조계산서 포함)

카) 재해 시 방재 활동의 중심이 될 시설물인 경우에는 방재 활동을 위한 동선 및 필요한 주차장 등의 공간에 대해서도 고려한다.

타) 관련 법규에 따라 가설구조물(비계, 동바리, 타워크레인, 흙막이가시설 등)에 대해서도 본 구조체와 같이 건축구조기술사 등이 실시하는 구조검토(날인 포함)를 하여야 하고, 그와 관련한 자료를 설계도서에 반영하여야 한다.

* 관련법규 : 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등) ⑤항, 동법 시행령 제101조의2(가설구조물의 구조적 안전성 확인)

파) 내진 안전성의 확보

a. 시설의 재해 시 기능 및 지역적 조건에 따라 건축 구조, 설비 및 비(非)구조 부재의 종합적인 내진 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

b. 지진 등의 재해로부터 시설이용자의 생명 및 재산의 보호를 도모해 2차 재해를 방지해야 한다.

c. 건축물로서의 내진 안전 성능은 건축 구조(구조체), 건축 설비(전기설비, 기계설비) 및 건축 비(非)구조 부재(구조체를 보호하거나 건축물 공간, 환경을 구성하는 구성 부위와 그 구성요소로서 외벽 및 그 마감재, 창 등의 개구부, 칸막이 및 내장재, 천장 및 바닥재, 가구 및 사무기기)가 종합적으로 조화를 이루도록 되어야 한다.

d. 구조계산서 및 도면은 구조기술사의 확인 날인하여 제출하여야 한다.

7) 주차장 설계

가) 주차수요(상주직원 및 방문객 등)는 사전에 면밀히 검토하고 건축 대상지 내 부설주차장을 조성하고 기존 공영주차장을 정비하는 주차계획을 효율적인 다양한 계획(안)으로 제안한다.

나) 주차장법, 함양군 주차장 조례 등 관련법령에 근거하여 주차계획하되 이용객들 대부분이 차량으로 접근할 것으로 예상되므로 가능한 최대의 주차대수를 확보하여야 한다.

다) 상위계획을 감안하여 자동차의 교통 동선, 이용자의 보행 동선, 주차장 관리상의 동선 등을 고려하여 상호간에 동선의 교차가 적고, 안전하고 원활한 이용이 가능하게 설계하여야 한다.

라) 주차장에는 필요에 응하는 관리용 시설을 설치하여야 한다.

마) 주차장의 출입구는 주변의 도로상황·교통상황·토지이용 상황 등을 고려하고, 보행자의 안전과 주변 도로의 교통흐름에 영향이 적게, 동시에 원활한 출입이 가능하도록 배려하여 계획하여야 한다.

바) 주차장에는 우천 시 우수 등의 피해를 입지 않도록 하고, 출입구 주변 제설, 동결 방지 등에 대한 대책을 강구하여야 한다.

사) 전기차 충전시설 및 주차대수는 법적인 검토를 통하여 반영하도록 한다.

아) 자전거와 이륜차 이용자를 위한 보관소를 확보한다.

자) 주차관제설비는 7자리 번호 인식이 가능하도록 계획하여야 한다.

차) 차량동선 계획 시 배후마을 공유주방의 반찬배달 차량 등의 서비스 동선을 고려하여야 하고 이를 반영한 주차규모를 제시한다.

카) 다랑복합센터 대상지 내 부설주차장은 주차규모를 최소한으로 하여 외부공간을 보행중심공간으로 조성할 것을 권장하며, 높은 주차수요를 해결하기 위한 기존 공영주차장 정비계획과 공영주차장에서 다랑복합센터까지의 보행동선을 제시하여야 한다.

8) 부대시설

가) (표지체계) 필요에 따라 시설의 이용에 편리하도록 표지 체계를 설계하되, 일반인과 장애인용, 실내와 실외로 구분하고, 중간설계 시 디자인(채색시안)안 제출 및 설치 위치를 계획하여 발주청과 협의한다.

나) (옥외 게시판 등) 필요에 따라 도로에서 쉽게 볼 수 있도록 옥외 전광판 및 간판, 현수막을 설치할 수 있는 장치를 적절한 위치에 계획한다.

다) (국기게양대) 국기게양대는 관련 법규*에서 정하는 바에 따라 계획한다.

* 관련법규 : 「대한민국국기법」, 국기의 게양 ·관리 및 선양에 관한 규정

라) 전면간판(본동 건물 외벽에 건축외관, 주변 자연여건 및 내방객 동선을 고려한 사인 위치 선정을 통하여 방문 고객의 이용 편의를 증대시킬수 있는 위치에 설치), 안내판, 돌출사인 등은 관련규정에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

9) 안전성 확보

가) 천장 및 벽체 등의 내장은 불연 또는 준불연재료를 사용하는 것을 원칙으로 하여 화재에 대한 안전성을 확보한다.

나) 사회약자(노약자, 장애인 등)의 편의 제공 및 긴급상황 등을 고려하여 동선 및 피난 경로는 간명하게 계획한다.

10) 건축도면 작성 특기사항

가) 평면도의 각 실의 실명, 실 번호 및 실 면적(중심선 기준)을 직접 기입한다.

나) 중요한 부분은 반드시 부분 평면 전개도 및 단면 부분 상세도를 작성한다.

다) 중요한 부분은 천장평면도를 작성하고 크기가 같은 동일형 실의 천장은 단위 천장 평면도를 작성한다.

라) 각 도면의 중심선은 마감표시선(보기:시멘트 모르타르선) 정도의 굵기로 뚜렷이 나타나도록 작성한다.

나. 토목분야

1) 일반사항

가) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되, 부지조성에 관한 사항은 기수립된 사항을 적용하되 필요시 발주기관과 협의하여 변경하도록 한다.

나) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 등을 면밀히 사전에 조사 분석한다.

다) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고, 배수계통도, 포장평면도, 하수계획 평면도는 세분하여 작성한다.

라) 공법 및 재료의 선택 등은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하고 비교·검토하여 가장 적합한 공법과 재료를 선택, 사용한다.

마) 건축설계도서를 바탕으로 토목 설계도서가 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 토공 및 흙막이 설계(필요시)

가) 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 양질의 토사를 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획한다.

나) 용역수행자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영한다.

다) 추후 실제 토사 반출량에 대한 정산이 가능토록 설계도서를 상세히 작성한다.

라) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

마) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계한다.

바) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지반조사 결과를 참고하고 적용 전 전문가의 자문을 득하여야 한다.

사) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영한다.

아) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하며 공법선정은 반드시 발주기관과 협의하여 결정한다.

3) 우․오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영한다.

다) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배 상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치한다.

바) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리하는 분류식으로 한다.

사) 하수도의 형상 및 규격은 합리성 및 경제성을 고려하여 검토하며, 이용 시 하수 유출이 되지 않는 수밀공법과 수밀시험이 가능하도록 재료 등을 사전에 발주기관의 승인 후 설계한다.

아) 하수도 구배는 부유물의 침전이 없고 하수가 누수되지 않도록 하며, 역류 영향 등을 세밀히 검토하여 결정한다.

자) 하수도 기초공은 지반의 종류에 따라 관의 침하 등을 감안하여 설계한다.

차) 추후 주변 부지 및 도로로 우수가 범람하지 않도록 설계 최대 유량에 여유를 두어 설계하도록 한다.

4) 도로 및 포장설계

가) 부지 내 도로계획은 이용자의 편의를 감안하여 합리적으로 계획하며 주변 도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치한다.

나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영한다.

다) 도로 및 주변광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치한다.

라) 포장공법(AASHTO 도로포장 설계법) 및 포장구조를 검토하여 경제적이고 실용적으로 설계한다.

마) 지반조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 주변도로 및 포장 설계 시 P.P. Mat 및 PET Mat 등 적용을 검토한다.

바) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하도록 설계한다.

사) 포장재료의 선정은 환경 친화적이고 투수성이 있는 재료를 선정·검토하여 발주청과 협의 후 설계에 반영한다.

아) 보차도 및 대지 경계 블럭의 규격 및 종류의 결정은 발주청과 협의 결정한다.

자) 포장부 재포장 시 탄소저감을 위해 친환경 에너지 저소비형 도로포장 중온아스콘을 적극 사용한다.

5) 기타

① 굴토 및 흙막이 가시설공사 등으로 인접대지의 건축물, 지반·도로, 인명 등에 피해가 발생되지 않도록 지반 및 지질상태, 지하구조물·매설물 등을 면밀히 분석·검토하여 가장 적합한 토목설계를 적용하여야 하며, 공사진행 중 본 사업장으로 인해 발생할 수 있는 주변 피해를 방지하기 위하여 관련 법규에 따라 필요 비용(지반침하 모니터링 용도의 CCTV, 계측설비 등) 등도 설계에 반영함으로써 인접대지 및 건축물의 피해와 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 굴착공법, 지보공법, 차수공법 등의 각종 공법은 안전성, 경제성, 시공성, 환경성 등을 종합적으로 검토하여 과도한 설계가 되지 않도록 한다.

③ 상․하수도 계획은 기존 상․하수도시설과 연계성 검토하여 설계토록 하고 대지 내 오수처리에 대하여 설계하여야 한다.

④ 성토 및 사토물량이 최소화 되도록 계획하고, 성토 및 사토가 필요한 경우에는 주변의 토취장 및 사토장 현황을 조사하여 가장 합리적인 장소를 설계에 반영하여야 한다.

⑤ 토목공사 중 굴착·발파로 인해 주변 건물 및 주민에게 미치는 영향(소음 및 진동 등)을 고려하여 그 피해를 최소화 할 수 있는 공법 및 방안을 강구하여 설계하여야 한다.

⑥ 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 민원 검토 및 주변 구조물의 피해 예상 등을 고려하여 적정한 공법을 선정하여 설계하여야 한다.

⑦ 공사 중 주변에 위치한 공공기관 및 이용객으로부터 민원 방지를 위해 환경부 ‘날림먼지 관리 매뉴얼’을 참조하여 구체적인 저감 방안을 마련하는 등 공사관리계획을 수립하여야 한다.

⑧ 부지 내의 지하에 매설된 제반 시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강 방법을 제시하여야 한다.

⑨ 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제 조치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.

⑩ 공법의 선정은 대지 여건, 지층 조건, 공사 목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적 공법을 선정하여야 한다.

⑪ 설계 시 국토교통부 등에서 제정한 각종 공사 표준시방서 및 설계기준(최근 발행)을 적용한다.

다. 기계설비 분야

1) 일반사항

가) 건축물에 설치되는 기계설비는 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」과 「건축물의 에너지절약 설계기준」, 「기계 설비기준」, 「경상남도 녹색건축물 설계기준[경상남도 고시 제2025-107]」을 준용하여 위생적이고 경제적인 설계를 한다.

나) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 기타 조건에 적합하게 설계한다.

다) 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하도록 설계하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주기관의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

라) 건축물에 설치되는 기계설비는 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」과 「건축물의 에너지절약 설계기준」을 준용하여 위생적이고 경제적인 설계를 한다.

마) 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 규정된 고효율기자재와 「신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법」에 의거 신․재생에너지설비를 검토 반영하여 유지관리 및 효율적인 기기 시스템을 선택한다.

바) 소음․진동 등 환경 공해 및 장비의 내진대책을 강구하여 설계에 반영한다.

사) 기기 배치는 공간의 실효성을 극대화하여 배치하고 설비의 도장 및 보온방법 등은 색상 및 효율, 주변여건을 고려하여 적절한 방법을 제시한다.

아) 건축, 토목, 전기․통신, 조경 등 타 분야와 연계되는 사항을 면밀히 검토하여 원활한 시공 및 기능을 유지토록 설계한다.

2) 위생설비

가) 급수방식은 현장상황에 따라 발주기관과 협의하여 반영한다.

나) 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

다) 급탕설비가 필요하다고 인정되는 곳은 급탕 사용량, 사용빈도, 위치 등을 고려하여 적절한 방식을 선정한다.

라) 지역난방, TES, CES 등에 따른 급탕방식은 그 방식의 기준을 따른다.

마) 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

바) 위생기구는 K.S 제품 또는 동등 이상 품을 사용하며 절수용으로 설계한다.

사) 보건, 위생적 측면을 고려하여 수질오염방지에 중점을 둔 재질과 시스템을 선정하고 적정한 수압, 수량 등을 고려하여 최적의 방식을 선정한다.

아) 오수처리설비는 처리대상인원, 방류수질, 용량, 처리방식, 위치선정, 오수통기관에 의한 주변 냄새 발생 등을 검토하여 설계한다.

자) 오․배수는 분리배관을 원칙으로 하고, 발생되는 소음 및 진동을 최대한 방지하고 통기를 원활히 한다.

차) 음용수용 배관설비는 다른 용도의 배관설비와 직접 연결되지 않도록 하며 식수, 정수, 급탕배관은 스테인레스관 또는 동관 등 내식성 재질을 사용하여야 한다.

카) 배수계통은 오물이 정체하거나 막히지 않도록 배관하고 관내를 쉽게 청소할 수 있도록 적당한 위치에 청소구를 설치한다.

타) 화장실별 위생도기 개수는「공중화장실 등에 관한 법률」을 검토하여 정한다.

3) 냉·난방 / 환기 설비

가) 기초계산서 및 냉․난방 방식의 적정 여부를 검토하여 설계한다.

나) 냉․난방기 안전장치(자동제어기기 및 부속품 포함)에 대한 검토를 하여 설계하도록 한다.

다) 사용 연료 및 저장시설에 대해 검토를 하도록 한다.

라) 폐열회수 장치에 대해 검토설계(전열교환기 등)를 한다.

마) 냉난방 시스템의 특성을 고려한 에너지 절약적인 열원방식을 선정 후 경제성 검토서를 설계 설명서에 첨부한다.

바) 공간별 환기량 및 환기방식을 비교 검토하도록 한다.

사) 습기 과다 발생 공간 벽체의 습기 차단계획 및 환기 방식을 제시하도록 한다.

아) 난방기기, 냉방기기, 송풍기, 펌프 등의 기기류는 부하 조건에 따라서 최고의 성적계수를 유지할 수 있도록 비례제어 운전이 되도록 해야 한다.

자) 장비의 배치는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 설계하며, 중량기기의 반․출입을 위한 경로 및 개구부 등을 고려하여야 한다.

차) 열원기기는 고효율기기를 채택하여 시스템의 에너지 효율을 향상시키기 위한 방법을 적극적으로 고려한다.

카) 사용 냉매는 친환경 냉매(410A, 407C 등)를 사용한다.

타) 환기탑, 환기구 및 환기 갤러리는 외기의 역류 및 눈비가 들어오지 않도록 개폐 장치, 후드(Hood) 등을 설치한다.

4) 소방, 방재 설비

가) 화재의 사전예방, 화재 시 조기경보 및 조기진화를 할 수 있도록 설계하여 피해를 최소화하고, 피난 유도에 만전을 기하도록 계획하며, 소방설비 기준에 적합하도록 설계한다.

나) 비상시 및 화재 시 피난 동선을 고려해서 충분한 조도가 확보될 수 있도록 하여야 한다.

다) 동절기 동파예방이 가능하도록 소방설비를 설계한다.

라) 소방점검에 대응이 가능하도록 소방설비 및 부대설비를 설계한다.

마) 소방배관은 적색 도색 또는 보온재와 적색 함석 마감 처리한다.

5) 자동제어설비

자동제어설비는 각 건물 규모에 적합한 것으로 선정하되 온․습도 조절 및 주요 장비에 대한 제어 등 운영관리 상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태 표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

5) 기타설비 : 설비 및 시설물 간 오작동 및 간섭이 없도록 설계한다.

6) 기계도면 작성 특이사항

가) 옥내 주배관은 반드시 종․횡단면을 작도하여 중요부분에 별도로 표시하고 배관의 구배를 나타내어야 한다.

나) 평면도에서 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 설치 및 부분상세도를 반드시 작도하여야 한다.

다) 자동제어 시스템 장치 계통은 평면도, 계통도 다이어그램으로 표시한다.

라) 각종 제품은 정확한 제작도면을 작도한다.

라. 조경분야

1) 일반 사항

가) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 건물, 주차장 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획한다.

나) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획한다.

다) 차량 동선 및 보행자 동선, 건물 내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 수경공간, 녹지공간 등을 종합적으로 고려하여 계획한다.

라) 시설 이용자의 편의 및 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계한다.

마) 건축설계도서를 바탕으로 조경 설계도서가 반영될 수 있도록 작성한다.

바) 기존 공영주차장 중심부에 있는 수령이 오래된 수목을 보존하기 위한 녹지와 주차공간을 계획하고 이와 연계한 자연친화적 계획을 수립할 것을 권장한다.

2) 조경 수목

가) 조경수는 해당 지역의 식생 및 일조량에 적합한 수종을 선정한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않은 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영한다.

다) 대상지 내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계한다.

라) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수 간의 거리를 확보한다.

마) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

바) 병충해, 전정, 동절기 보온 등 유지관리가 용이한 수목을 선정한다.

사) 오염에 강하고 계절감이 있는 수목 구성으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

3) 조경 시설물 등

가) 벤치, 등의자, 파고라 등 시설물은 이용자들의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

나) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 설계하여야 한다.

다) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적 재료를 사용한다.

라) 필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하며, 이 경우 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려해야 한다.

마) 케이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인 또는 적용안의 설치 위치는 계획안을 작성하여 발주기관과 협의하여 결정한다.

마. 전기설비 분야

1) 일반사항

가) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

나) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

다) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

라) 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

마) 최근 개정된 법령 중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

2) 수변전 설비

가) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

나) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

다) 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

3) 동력공사

가) 전동기의 용량에 알맞는 개폐기 및 전선굵기로 선정하여야 한다.

나) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

다) 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

라) 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

4) 조명설비공사

가) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

나) 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 실폭 등을 고려하여야 한다.

다) 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토하여야 한다.

라) 건축물의 부분경관조명, 옥외가로조명, 부분연출조명을 고려한 계획안을 감독원과 협의 결정한다.

5) 전열공사

가) 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

나) 용도에 알맞은 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

6) 소방설비공사

가) 소방법에 적합한 설계를 하여야 한다(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등).

나) 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여야 한다.

바. 정보통신 분야

1) 일반사항

가) 시설 및 사무실의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다

나) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다) 설계시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계해야 한다.

- 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계해야 한다.

2) 전화설비

가) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

나) 교환실의 위치, 교환기의 형식 및 전화수구 수량이 적정하여야 한다.

다) 교환대의 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

3) LAN 설비

정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

4) 약전설비공사

가) 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

나) MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

다) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

사. 소방 분야

1) 일반사항

가) 소방시설은 기계(소화) 및 전기(소방)로 분리하여 설계도서를 작성해야 한다.

나) 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여 설계해야 한다.

다) 건축설계도서를 바탕으로 소방 설계도서가 반영될 수 있도록 작성해야 한다.

2) 화재경보설비

가) 자동화재 탐지설비를 설계에 반영하여 설계해야 한다.

나) 주수신반은 중앙공급실과 연동이 되고 부수신반은 상시 근무자가 있는 곳에 설치하며, 비상방송 연동회로를 내장하도록 설계해야 한다.

다) 감지기 종류 및 수량은 용도와 면적에 맞게 충분히 설계해야 한다.

라) 각 층별 발신기 설치는 법정 수용거리 이내에 두고, 기계설비의 소화전과도 연동

마) 방재설비와 관련된 전원을 검토해야 한다.

3) 유도등 설비

가) 용도 및 장소별로 피난구 유도등과 통로 유도등을 설치해야 한다.

나) 화재 시 시설내 이용자들이 빠르고 안전하게 대피할 수 있도록 설치해야 한다.

4) 소방도면 작성 특이사항

가) 평면도는 자동화재탐지설비, 유도등설비, 배연설비, 제연설비 등으로 세분화 작도를 해야 한다.

나) 경계구역 및 구역일람표를 작성해야 한다.

다) 중요한 부분은 반드시 평면상세, 단면 부분상세도로 작도해야 한다.

라) 각종 제어반의 결선도 내부 및 외부상세도를 확실하게 작도해야 한다.

마) 각종 제작품은 확실한 제작도면을 작도해야 한다.

제5장 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

- 설계도서 작성은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」규정에 의한 “2종(보통) 중급”으로 작성하여야 한다.

- 감독자는 원활한 용역수행 등을 위하여 제출 부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업이행 요청서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 용역수행자는 이에 적극 협조하여야 한다.

- 용역수행자는 모든 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 재작성하여 제출하여야 한다.

가. 설계도서(성과품) 작성구분

1) 도서의 작성은「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」에 의거 작성하여 성과품을 제출한다. 그리고 내역서 작성은 최종 설계도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 물량 등의 착오가 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 건축(토목․조경포함)․기계․전기․통신․소방․관급자재․폐기물처리 등 공종별로 분리하고 발주기관과 협의하여 설계도면 및 공사비 명세서 등 내역을 작성하여야 한다.

3) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용한다.

나. 설계도서(성과품)의 표기

1) 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는「용역계약일반조건」제5조(사용언어)에 의한다.

2) 표기문자 및 숫자는 한글 및 아라비아숫자 사용을 원칙으로 하되, 이해가 곤란한 경우에는 영문 및 한자로 표기할 수 있다.

3) 소수점 이하의 숫자가 있을 경우 셋째자리에서 반올림한다.

4) 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

5) 모든 설계도서에 작성되는 각 실의 명칭 등은 서로 동일하게 사용한다.

6) 약어를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1~2회 사용되는 경우 원어 사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용한다.

7) 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

가) 건축도면 : A

나) 건축구조도면 : S

다) 토목도면 : C

라) 조경도면 : L

마) 기계설비도면 : M

바) 전기도면 : E

사) 통신도면 : ET

아) 소방도면 : MF(소화설비), EF(전기소방)

2. 성과품의 작성

가. 계획 및 중간설계 도서의 작성

1) 건축기획자료(건축기획 보고서 및 설계지침서)를 기반으로 발주기관에서 수렴된 사용자 협의(주민위원회, 지역협의체) 결과에 따라 계획안을 조정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 단계로, 발주기관의 요구조건을 반영한 기본설계(안)을 제출하고 승인을 받는다(필요시 2개 이상 대안 제출).

2) 계약상대자가 제출한 안이 부적합하다고 발주기관이 검토의견을 통보하는 경우에는 조속한 시일 내에 새로운 안을 재작성하여 제출하여야 하며, 그로 인한 용역비의 추가 및 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

3) 발주기관이 보완 조건으로 설계(안)을 승인하면 계약상대자는 즉시 보완․제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 실시설계를 진행한다.

4) 건축계획서 : 분야별 설계개요 및 설계의도 설명, 전기․설비계통도 등 기본설계 단계에서의 필요 및 결정사항을 모두 수록하여야 한다.

5) 법규 체크리스트 : 적용이 예상되는 제반법규 및 단계별 법적절차의 검토가 가능하도록 작성하여야 한다.

6) 대안검토 : 계획의 원칙 및 기준을 제시하고, 계획별 장․단점 비교, 기본설계 채택 과정의 설명(외부 마감재 사양에 따른 대안 제시 포함)을 포함하여야 한다.

7) 투시도(조감도) : 외부 조감도 전체 1컷, 내‧외부 각 1컷

나. 설계도면 작성

1) 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명, 날인한다.

2) 도면은 AUTO CAD로 작성하며, 파일 제출 시 DWG 및 PDF 형태 모두 제출한다.

3) 도면의 크기는 KS A5201의 A1～A3에 준하는 것을 원칙으로 한다.

4) 축척은 실시설계의 축척에 따르되, 도면에 적합한 통상적인 축척을 사용하고 동일 종류에 대하여는 통일시켜야 한다.

5) 각 공종마다 도면목록을 작성하고 방향표시, 단면표시, 상세표시(키플랜) 및 보기를 넣어 쉽게 해당 부분을 찾을 수 있도록 한다.

6) 모든 도면상에는 종 또는 횡의 열 부호를 표시한다.

7) 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

8) 설계도면은 누락된 부분이 없고 현장 기술자들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성한다.

9) 마감재료는 부재명, 재료명, 규격(두께×너비×길이), 마무리, 색 등을 표시한다.

10) 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 한다.

가) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

나) 각종 부착시설물의 표시

다) 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 기타 부대설비와 관련하여 명확한 구분 표시

라) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성하고, 공인기관 기술검토서를 첨부하도록 한다.

11) 조감도, 투시도 및 색채디자인 기본계획(내·외장재 색채기본계획을 설계도서에 표시)을 작성한다.

다. 설계설명서 작성

1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

2) 설계개요

가) 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률

나) 주차면적, 조경면적

다) 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도

3) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사한 내용 표기

4) 기타 각 공종에 대한 설명 및 고려사항 등

라. 시방서 작성

1) 일반 공통 시방 및 특기시방으로 구분하여 시방서를 작성하되, 일반사항은 국토교통부 제정 공사시방서 작성요령을 준용하고 특기시방서는 일반시방서에서 정하지 않은 시공시 유의사항 및 특별 주문사항 등을 구체적으로 명시한다.

2) 일반시방서 및 특기시방서는 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 구분하여 작성한다.

3) 시공자가 시공 상태를 검토, 확인받아야 하는 대상 공종을 특기시방서에 명시한다.

마. 내역서 작성

1) 공사비 총액은 공사원가금액(자재비, 노무비, 일반관리비, 이윤 등의 합산액)으로 하되, 부가가치세를 포함한 금액으로 한다.

2) 설계에 반영되는 자재와 공법을 면밀히 검토하여 최대한 공사비를 절감할 수 있도록 한다.

3) 물가는 조달청 고시 가격을 원칙으로 한다.

4) 조달청 미수록 단가는 기획재정부에 등록한 전문 가격조사 기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 낮은 가격을 적용한다.

5) 견적단가를 적용할 시는 반드시 견적서 원본을 제출(타인견적 2부 포함)한다.

6) 노임은 당해 연도 고시 노임단가를 적용한다.

(단, 납품 후 공사 착공 시 정부 노임 및 단가가 변경되었을 경우 발주기관의

요청에 의거 당해 연도 단가로 보완하여야 한다.)

7) 공사비 적산은 정부 표준품셈 및 건축공사 적산기준에 따라 산정한다.

8) 외국수입자재인 경우에는 수입견적자의 견적서(타인견적 2부 포함)로 설계한다.

9)「건설기술진흥법」의 산출기준에 따라 안전관리비 및 품질관리비 등을 계산하여 내역서에 반영하도록 한다.

10) 모든 가시설물은 시공이 가능하도록 충분하게 설계하고 내역서에 반영하도록 한다.

바. 유지관리지침서 등 작성

1) 시설물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성하여야 한다.

2) 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

사. 예정공정표 작성

1) 예정공정표는 전체 공정을 포함하여 보할공정표의 형태로 작성한다.

2) 예정공정표는「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따른 공사기간을 토대로 작성한다.

아. 이동식저장장치(CD 또는 USB) 제출

1) 설계도면은 CAD 프로그램으로 작성하며, PDF 전환 파일도 함께 제출한다.

2) 공사내역서 및 산출근거는 EXCEL 프로그램으로 작성한다.

3) 기타 설계도서(설계설명서, 시방서, 계산서 등)는 한글 프로그램으로 작성한다.

4) 본 용역과 관련된 모든 설계도서 및 제반서류는 전부 파일로 제출하도록 한다.

자. 설계도서 검토

1) 검토 방법

가) 설계시행 책임기술자가 검토

나) 각종계산서 확인 검토

다) 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

2) 제출도면

검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토도면 2부 제출

3) 제출시기 : 중간 검토 및 준공 시 제출

3. 성과품의 납품시기

성과품의 납품은 계획 및 중간설계 도면납품, 실시설계 최종납품으로 구분한다.

가. 계획 및 중간 설계 납품 : 착수일로부터 45일 이내 (제출도면은 용역 감독자와 협의하여 결정)

나. 검토용 실시설계도서 납품 : 용역준공일 전 20일 이내 (제출도서는 용역 감독자와 협의하여 결정)

다. 최종 실시설계도서 납품 : 준공계 제출시 납품

라. 용역비 산정 및 지불

1) 설계비의 산정은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」을 기준으로 산출한다.

2) 실시설계에서 산출된 공사비가 당초 용역비 산출 때 적용한 공사비보다 적을 경우, 세부설계 공사비에 맞추어 용역설계 금액을 정산한다. 단, 실시설계시 산출된 공사비가 당초 용역비 산출 때 적용한 공사비보다 초과 시 발주기관과 공사비 및 용역 설계금액을 협의 하에 결정한다.

3) 용역비 지급은 정부 예산규정에 따른다.

4) 용역대가의 최종 지급 시기는 1)의 조건을 완료 후 대가의 지급을 청구받은 날로부터 7일 이내에 대가를 지급한다.

5) 제시 기준 면적에 대한 설계면적 증감에 따른 용역비는 정산하지 않는다.

4. 기타

가. 관급자재 및 주요자재

1) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 공사용 자재 직접구매 대상 품목인 경우 관급자재로 지정하여야 한다.

2) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계한다.

3) 각종 자재의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상, 질감, 무늬 등의 기능에 적합한 환경친화적인 자재 및 경제적인 자재를 사용한다.

4) 자재 및 장비선정 시 설계의 의도에서 벗어나지 않는 한 조달청 우수제품 및 신기술제품 등의 사용을 검토한다.

5) 사용자재는 KS제품 사용을 원칙으로 하며, 국내 자재 중 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

6) 소방관계법에 의한 방염기준을 적용한 자재를 사용한다.

7) 지급자재는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」을 만족하며, 지급자재 목록 등 중요사항에 대하여 발주기관과 사전에 협의한다.

8) 설계도면에 주요자재의 구체적 업체 상호 및 상표 등을 명시하지 않도록 한다.

9) 부득이 수입자재 등을 사용 시에는 사전에 발주기관과 협의하여 결정한다.

10) 추정가격 1억원 초과(단일품목 기준) 관급자재에 대하여는 발주기관의 「관급자재선정위원회 운영규정」에 따라 선정한다.

나. 설계의도의 구현

1) 관계법령

- 용역수행자는「건축서비스산업진흥법」제22조(설계의도 구현)에 따라 건축물의 설계의도가 구현될 수 있도록 「마천면 기초생활거점조성사업 다랑복합센터 건립」의 건축과정에 참여하여 같은법 시행령 제19조(건축과정에의 용역수행자 참여 기준 등)의 업무에 협조하여야 한다.

2) 과업의 내용

- 설계도서의 해석 및 자문

- 현장 여건 변화 및 업체 선정에 따른 자재와 장비의 치수ㆍ위치ㆍ재질ㆍ질감ㆍ색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토ㆍ보완

제6장 납품목록

1. 계획 및 중간설계 납품도서목록

[*전 공정(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방)]

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	5	부	개략적 조감도 및 투시도 포함
2	관련법규 검토서	-	5	부
3	현장조사 내용	A4	5	부
4	공사비 검토서	A4	5	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
4	중간설계 보고서*	A4	5	부	계획설계 내용 포함, 개략공사비 내역서 등
5	설계 도면*	A3	5	부	전 공종 분리
6	색채계획서	-	5		외장 및 내부 주요실(바닥,벽,천장), 마감재 사양 및 색상표(색상번호기재), 색상대비표 제출
7	투시도(조감도)	-	5		3컷, 필요시 수량변경
8	각종 인․허가 관련 심의도서*	A4	5	부	각종 심의용 파워포인트 등(필요시)

※ 납품도서는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 [별표 2 건축설계에서의 도서작성] 제1항 계획설계, 제2항 중간설계의 도서내용을 참고하여 작성한다.

※ 모든 성과품의 제출시기와 수량 등은 발주처와 협의하여 변경될 수 있다.

※ 설계도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다. 단, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 분야만 제본한다.

※ 설계공모 심사위원 의견 및 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 이동식 저장장치로 제작하여 제출한다.

※ 전체적인 일정을 고려하여 “계획 및 중간설계”, “실시설계”를 일괄합본 또는 2회에 걸쳐 나누어 납품할 수 있다(발주처 승인 시)

2. 실시설계 납품도서(*전 공정(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방))

구분	설계도서명	규격	수량	단위	비 고
1	종결보고서	A4	협의	부	1부로 작성
2	시행계획보고서	A4	협의	부
3	설계설명서	A4	협의	부
4	원 도*	A3	협의	부	발주기관 요구 시
5	설 계 도 면*	A1/A3	협의	부	각 규격별, 반접이
6	계 산 서*	A4	협의	부
7	내 역 서*	A4	협의	부
8	관급내역서*	A4	협의	부
9	수량산출서*	A4	협의	부
10	단가산출서*	A4	협의	부	견적서 포함
11	일 위 대 가*	A4	협의	부
12	일반시방서*	A4	협의	부
13	특기시방서*	A4	협의	부
14	관급시방서*	A4	협의	부
15	조감도/투시도		협의	부	- 건축에 한함
16	공정표*		1	부	- 전공종 포함
17	이동식 저장장치(CD 혹은 USB)*		3	SET	- 중간/실시설계 도서 / 각종심의 / 인허가관련 / 문서 / 회의록 / 각종발표자료 등 포함
18	공사계약요청자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, XML file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등
19	자재 견본 자료*	A4	2	SET
20	기타 발주기관 요구사항*

※ 모든 성과품의 제출시기와 수량 등은 발주처와 협의하여 변경될 수 있다.

※ 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

※ 종결보고서: 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

붙  임  1. 청렴서약서

2. 책임기술자 선임계

3. 설계 검사원(계획 및 중간, 실시)

4. 설계도서 표지 및 제본의 형식

별  첨  1. 설계용역 보고서상의 참여기술자 명기 양식

〔붙임 1〕

청 렴  서 약 서

1. 용  역  명 :

2. 계약상대자 :

당 사는 위 공사의 설계에 반영되는 관급자재 선정을 위한 심의(안) 작성에 있어 관계 법령 등에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명하게 관급자재가 선정될 수 있도록 최선을 다할 것이며, 설계용역 수행과정에서 관급자재를 납품하고자 희망하는 업체에게 어떠한 금품ㆍ향응이나 부당한 이익을 제공받지 않을 것을 확약합니다.

만약 이를 위반할 시에는 어떠한 처벌이나 불이익 조치도 감수하겠으며, 발주기관의 조치와 관련하여 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

한국농어촌공사 거창·함양지사장  귀하

〔붙임 2〕

책임기술자 선임계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 :

4. 착수일자 :

5. 완수예정일 :

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

한국농어촌공사 거창·함양지사장  귀하

〔붙임 3〕

설계 검사원 (계획 및 중간, 실시)

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 :

4. 착수일자 :

5. 완료예정일 :

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획 및 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

한국농어촌공사 거창·함양지사장  귀하

〔붙임 4〕

설계도서 표지 및 제본의 형식

구 분	실 시 설 계
설계도면		(측) (전면)
		00군 00면 기초생활거점조성사업	00군 00면 기초생활거점조성사업 도면명 20 . . 한국농어촌공사 거창·함양지사장
각종서류		(측) (전면)
		00군 00면 기초생활거점조성사업		00군 00면 기초생활거점조성사업 도면명 20 . . 한국농어촌공사 거창·함양지사장

◦제출도서 표지의 글씨는 한글 고딕체(진하게) 하고 색채는 흑색으로 한다.

◦표지용지는 레자크지 #75 250ｇ/㎡로 한다. (제출되는 제반도서 포함)

※ 별첨1. 설계용역 보고서상의 참여기술자 명기양식 1부.

〔별첨 1〕

설계용역 보고서상의 참여기술자 명기 양식(예시)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◦ 용 역 명:

◦ 용역기간:

분야별	참 여 기 술 자						비 고
	소 속 업 체 명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	주민등록 번 호	자 격 증 번 호
							※협력용역업체 소속기술자는 소속업체명을 기재할 것.

※ 비고란에는 참여기술자 등급을 기재(예:특급, 고급)