「발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간) 건립」

과 업 이 행 요 청 서

2025. 4.

[도시정비과]

목      차

Ⅰ. 사업 개요	1

1.1 사업 목적

1.2 사업 개요

1.3 시설 규모

Ⅱ. 설계용역 개요	2

2.1 용역의 계약

2.2 용역의 범위

2.3 용역 수행자의 책임 및 교체

Ⅲ. 설계도서 작성 지침	5

3.1 설계도서의 작성

3.2 설계착수 시 제출서류

3.3 보고회 및 업무보고

3.4 기성 및 준공검사

3.5 설계 시 준수사항

Ⅳ. 분야별 설계지침	9

4.1 일반사항

4.2 건축분야 설계지침

4.3 토목분야 설계지침

4.4 기계분야 설계지침

4.5 조경분야 설계지침

4.6 전기분야 설계지침

4.7 통신분야 설계지침

4.8 소방분야 설계지침

4.9 기타사항

Ⅴ. 과업단계별 지침	21

5.1 기본(중간)설계 지침

5.2 기본(중간)설계 도서

5.3 실시설계 지침

5.4 실시설계 도서

5.5 예비인증 취득업무(해당시)

Ⅵ. 납품도서 목록	30

6.1 기본(중간)설계 납품도서

6.2 실시설계 납품도서

Ⅶ. 각종서식	31

【서식 1】 착수계

【서식 2】 서약서

【서식 3】 사용인감계

【서식 4】 책임기술자 선임계

【서식 5】 참여기술자 현황

【서식 6】 분야별 책임기술자 선임계

【서식 7】 공동수급표준협정서(분담이행방식)

【서식 8】 보안각서

【붙임】 참여기술자 각서인

【서식 9】 하도급 승인요청서

【서식 10】 (기본, 실시)설계 검사원

【서식 11】 주간 공정보고서

【서식 12】 월간 공정보고서

Ⅰ. 사업 개요

1.1 사업 목적

2019년 국토부 도시재생사업으로 선정되어 추진하는 사업으로 묵호항의 역사 및 해양을 테마로 한 기반시설을 마련하고, 다양한 문화 활동을 체험 할 수 있는 복합문화공간 및 어울림센터를 조성함으로써 지역의 관광인프라 개선 및 지역주민의 참여공간 제공으로 지역경제 활성화 도모

1.2 사업 개요

구 분		내 용
사업명칭		발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간) 건립
대지위치		강원특별자치도 동해시 발한동 288-9 번지 외 11필지 288-5,288-8,288-11,288-12,288-13,288-10,286-7,287-11,287-22,299-19,299-20
지역지구		도시지역, 일반상업지역
시행 및 주관기관		동해시 도시정비과
공모 사업 범위	주요용도	문화 및 집회시설, 제2종 근린생활시설
	대지면적	1,557㎡
	건축규모	기준 연면적 1,654.31㎡(연면적 조정 가능 범위 +0%~10%)
	건폐율 / 용적률	법정 : 80%이하 / 1,300%이하
규모	층수	지상3층(변경가능)
	주차장	최소 13대(법정주차대수 이상)이상 계획
추정 공사비		6,420,940,000원 (부가세포함) / 건축물 주변 토목, 조경비 포함
예정 설계비		318,635,000원 (부가세포함)
예정 설계기간		7개월 (기본, 실시설계 210일, 공휴일 포함)
과업 주요내용		1) 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간) 건립에 따른 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거 및 폐기물 처리 등 계획, 중간 및 실시설계용역 등의 설계비와 각종 행정절차에 필요한 자료 등 도서 작성 업무 일체 2) 각종 인․허가 서류 작성 및 협의

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 이에 따른 설계용역비는 동일 기준에 의해 재산정함.

※ 추정공사비 초과 불가(향후 실행공사비 동일)

※ 추정 공사비는 부가세 등 포함으로 건축, 건축물 주변 토목/조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 일체를  포함한 금액임 (추정공사비 손해배상공제료 미포함)

※ 예정 설계비는 기본 및 실시설계비, 각종 인증비용 건축협의, 부가세 등에 대한 용역비 포함 (지반조사, 현황측량, 문화재 지표조사, 본인증 용역비 및 인증수수료 등은 발주기관에서 부담)

∘ 시행□주관기관 : 동해시 도시정비과

∘ 공모 홈페이지 : https://dh.go.kr/(동해소식/고시·공고)

∘ 공모 담당자 : 동해시 도시정비과 김승회 주무관 (kim79sh@korea.kr, 033-530-2628)

1.3 시설 규모(세부계획)

필요시설	세부용도	연면적	비 고
개항문화발전소	개항역사전시 홍보관	450㎡
	항구문화전시 체험장	450㎡
	개항문화축제발전실 및 큐레이터공방	450㎡
북카페	복합문화공방	166㎡
어울림센터	북카페	119㎡
합계(연면적)		1635㎡

※ 상기 공간 계획 외 서비스공간(창고, 공용공간 등) 및 설계자가 필요하다고 판단되는공간(완충공간, 상기 공간 외 추가 계획 공간 등)은 총 공사비 범위 내에서 발주처의 추가 의견수렴 및 설계자의 창작성을 발휘하여 제시 가능

※ 각 공간 면적 계획은 +3% 범위 내에서 조정 가능하며, 전체 연면적은 적정한 공용면적과 각 실의 합리적 기능을 확보하기 위해 전체 연면적의 +0%~5% 범위 이내에서 증가 가능

※ 쾌적한 실내환경, 안전한 피난 여건을 위해 공용면적은 연면적의 35% 수준으로 확보 가능

※ 주요시설의 구체적인 배치 및 면적 등은 과업수행 과정에서 발주기관과 협의하여 확정

Ⅱ. 설계용역 개요

2.1 용역의 계약

가. 용역 기간

1) 용역기간 : 착수일로부터 210일 (7개월)

2) 용역기간의 연장 : 다음과 같은 부득이한 경우에는 용역기간을 연기할 수 있다.

가) 천재지변 등 예측하지 못한 작업 불가 일수가 계속될 때

나) 조사물량의 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피할 때

다) 발주청의 부득이한 사정으로 작업 중지 또는 연기의 필요가 있을 때

라) 기타 부득이한 사유로 연기가 불가피하다고 발주청이 인정할 때

3) 용역의 정지 : 다음과 같은 부득이한 경우에는 용역을 일시정지 할 수 있다.

가) 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 않는 경우

나) 인·허가 및 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당기간 소요되는 경우로 발주청의 승인을 받았을 경우

다) 과업 수행 중 정책변경, 기술심의, 설계 VE 등 불가피한 사유가 발생 시

라) 기타 부득이한 사유로 연기가 불가피하다고 발주청이 인정할 경우

4) 그 외 용역 기간에 대한 범위 및 내용은「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제14장(용역계약 일반조건)에 따른다.

나. 용역의 설계변경

1) 계약 후 추가과업 또는 면적증가 없이 추정공사비가 증액되는 경우(사용재료, 기타 등)로 인하여 설계비가 증가할 경우에는 증액설계비를 발주기관에 요구할 수 없다.

2) 그 외 설계변경에 대한 범위 및 내용은「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제14장(용역계약 일반조건)에 따른다.

다. 계약의 해지 : 다음과 같은 경우 일방적으로 과업의 해지를 요구할 수 있다.

1) 용역 수행자가 용역수행이 불가능하다고 판단될 때

2) 발주청의 지시에 불응하여 설계를 진행하거나 고의적인 불성실로 과업성과를 만족하기 어려울 때

3) 설계용역 수행 중 공사비가 소요예산을 현저하게 초과 될 것으로 판단될 때

4) 용역 수행자가 계약의무사항의 이행을 위반할 때

5) 그 외 계약 해제 및 해지에 대한 사항은「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제14장(용역계약 일반조건)에 따른다.

라. 하도급의 범위

1) 협력업체에 대한 하도급의 범위 및 내용은「건설기술진흥법」제35조(발주청이 시행하는 건설기술용역사업)에 따르며, 업무 한계를 명확히 하여 과업수행에 최선을 다한다.

2) 하도급계약 체결 시 [서식 9] 하도급 승인요청서를 작성하여 발주청의 승인을 받아야 한다.

3) 용역 수행자는 본 과업을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

가) 각종 조사 및 이와 유사한 작업

나) 제도 및 도면작업 등의 작업

다) 건설공사의 수량내역서 및 견적업무에 관한 작업

라) 각종 평가업무

마) 기타 발주청이 특별히 인정하는 업무

4) 하도급 계약을 체결하더라도 모든 납품도서 및 제반사항에 대해 용역 수행자가 총괄 책임진다.

2.2 용역의 범위

가. 설계 범위

건축, 구조, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신(보안시설 포함), 소방, 가시설, 각종 인증 등 전 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시설계도서 작성

나. 용역 범위

1) 기본(중간) 및 실시설계도서 작성

2) 공사 수행을 위해 필요한 제반 설계도서 작성

3) 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따른 공사기간 산정 및 예정공정표

4) 각종 관계법령 규정에 의한 인·허가(용도변경이 수반되지 않는 리모델링으로 계획) 관련서류 작성

5) 내부 규정에 의한 각종 심사(계약심사, 원가심사 등)에 대한 조치

6) 설계자문위원회 및 발주청 지적사항에 대한 조치 등

7) 필요 시「건설기술진흥법 시행령」제75조의2(설계의 안전성 검토)에 따른 설계의 안전성 검토 업무 등

8) 각종 인증 취득(에너지절약계획서, 건축물 에너지효율등급, 제로에너지인증, 장애물 없는 생활환경 인증에 대한 서류작성, 건축인허가 관련 서류, 건축구조안전 및 내진설계확인서, 각 실별 기준실 수 및 기준면적대비표, 기타법령에 의한 서류 작성 등 행정절차 제반사항)

다. 용역 수행

1) 용역 수행자는 본 과업이행요청서의 문구 해석상 계약 상대자간 차이가 있을 경우 및 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 설계자 임의로 판단해서는 안 되며, 발주청과 협의를 통해 이행한다.

2) 본 과업내용서에 규정되지 않은 사항은 발주청의 관련규정 및 정부관련 법령 및 정부제정 각종 시방서·규정 등에 따라 발주청과 협의하여 수행한다.

3) 용역 수행자는「건축서비스산업진흥법」제22조(설계의도 구현)에 따라 건축물의 설계의도가 구현될 수 있도록 업무를 수행한다.

4) 용역 수행자는 심사위원회 및 자문위원회의 평가의견과 발주청의 요구사항을 종합하여 수정 및 보안이 필요한 경우 이를 설계에 반영한다.

5) 설계과정에서 직원 의견 수렴을 위한 설계 설명회를 실시할 경우, 설계단계별로 직원의견 수렴결과를 적극 검토하여 설계에 반영한다.

6) 발주청은 용역 수행자에게 설계 중 이행이 완료된 부분의 설계도서를 제출·요구하여 수정·보완 지시할 수 있으며 용역 수행자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

7) 기본설계 완료 시 각종 예비인증업무 수행업체에게 기본설계 납품 도서를 제공해야 하며, 설계 진행 시 충분한 협의를 통해 필요한 예비인증을 반드시 취득하도록 한다.

8) 납품 이후에도 각종 인·허가 및 영향평가 등 타법 관련 행정절차에 따른 자료작성 업무를 적극 이행한다.

9) 모든 예비인증, 인·허가, 영향평가 등은 설계용역완료 전 취득한다.

10) 본 용역시행에 필요한 해당기관과의 협의 및 승인은 용역 수행자의 책임으로 득한다.

11) 「일반용역계약특수조건」제9조(과업내용의 추가, 변경 및 해석)에 따라 설계 중 발주청이 별도의 지침에 의하여 과업지시를 할 수 있으며, 용역 수행자는 이에 응해야 한다.

12) 용역 완료 1개월 전 발주청에 납품예정 도서를 제출하여 사전 승인을 받은 후 최종 납품

13) 그 외 명시되지 않은 계약에 관한 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 등에 따른다.

2.3 용역 수행자의 책임 및 교체

가. 용역 수행자의 책임

1) 설계의 책임 및 손해배상은 관계법령에 의한다.

2) 본 과업을 수행함에 있어 일어나는 모든 사고는 용역 수행자가 책임을 진다.

3) 설계도서는 용역 수행자의 책임으로 작성하며, 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계변경 등의 사항에 대하여「건축사법」제20조(업무상의 성실 의무 등)에 의한 손해배상 책임을 져야하며, 「같은법 시행령」제21조(건축사의 보험 또는 공제 가입)에 따라 손해배상 보험증서 또는 공제증서를 제출한다.

4) 용역 수행자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적 모순, 관계법령 위반 등)로 인하여 발생되는 인명피해, 재산상의 손실, 기타 공사 진행상 초래되는 문제점 등 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야한다.

5) 용역완료 후에도 공사 중 발생하는 설계도서에 관한 문의 및 질의사항에 대해 적극적으로 협조(답변서 제출 등)한다.

6) 용역 수행자는 제출한 과업에 대하여 전반적인 책임을 져야하며 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 설계용역자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 책임이 면제될 수 없으며, 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 설계도서의 성과로 첨부된 경우도 위와 같다.

7) 용역완료 후에도 위 사항에 대한 발주청의 수정·보완요구가 있을 때에는 용역 수행자의 부담으로 이행한다.

8) 본 과업으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 손실 보상한다.

나. 용역 수행자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력·경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주청이 과업수행에 부적격하다고 판단되는 경우 교체를 요구할 수 있으며 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

2) 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 또는 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생했을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자 또는 그 이상으로서 발주청의 승인을 받은 후 교체한다.

Ⅲ. 설계도서 작성 지침

3.1 설계도서 작성

설계도서의 작성방법은 발주청이 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주청과 협의한 후 후속작업을 진행한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행하도록 한다.

3.2 설계 착수 시 제출서류

가. 용역 수행자는 경쟁입찰계약 체결일로부터 10일 이내에 용역을 착수한다. 다만, 발주청의 사정 및 사업의 추진여건에 따라 착수일을 조정할 수 있다.

나. 용역 착수 시 발주청에 착수계를 2부(1부는 원본, 1부는 사본) 제출한다.

다. 착수계 서류목록

1) [서식 1] 착수계 1부.

2) [서식 2] 서약서 1부.

2) [서식 3] 사용인감계 및 인감증명서 1부.

3) [서식 4] 책임기술자 선임계 1부.

4) [서식 5] 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부.

5) 설계용역 수행 조직표 및 분야별 참여기술자 투입계획 1부.

6) [서식 6] 분야별 책임기술자 선임계 1부.

7) [서식 7] 공동수급표준협정서(분담이행방식) 1부.(해당 시)

8) 설계용역 예정공정표(기본 설계 납품예정일자 명시) 1부.

가) 착수·중간·최종 보고회 예정일자 명시

나) 기본 설계도서 납품 예정일자 명시

다) 예비인증 신청 예정일자 명시

라) 최종납품 예정도서의 발주청 사전 승인을 위한 사전제출 예정일자 명시

9) 계약금액에 대한 산출내역서 1부.

10) 하도급(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 예정현황 각 1부.(해당 시)

11) [서식 8] 용역 수행자 및 참여업체 보안각서 및 보안대책 1부.

12) 과업수행계획서 1부.

가) 관련 분야별 업무범위와 책임한계

나) 설계품질보증 및 관리계획(업무 조직도, 점검 흐름도, 점검시기 및 회수, 점검사항 및 방법 등)

다) 목표예산을 고려한 설계운용 계획

라) 각종 인허가 절차 수행 계획

마) 각종 예비인증 수행 계획

3.3 보고회 및 업무보고

가. 보고회 : 보고회는 총 3회(착수, 중간, 최종) 개최한다.

1) 착수보고회

가) 착수보고회는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 15일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 착수보고회 시 책임기술자는 당선작에 대한 전반적인 설명 및 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명한다.

2) 중간 보고회

가) 중간 보고회는 기본설계가 완료(1개월)된 후 개최한다.

나) 중간 보고회 시 기본 설계안을 바탕으로 해당 부서 및 관계자와의 협의를 통해 요구사항을 최대한 반영할 수 있도록 하며, 각종 행정절차의 진행계획을 설명한다.

3) 최종 보고회

가) 최종 보고회는 늦어도 용역 완료 1개월 전에 개최한다.

나) 최종 보고회 시 중간 보고회의 의견 및 요구사항을 반영한 최종 확정안에 대해 설명하며, 각종 행정절차 완료상황 및 예비인증 취득결과를 보고한다.

나. 업무 보고

1) 주간 공정보고 : 발주청과 협의하여 매주 지정하는 요일에 [서식 11] 주간 공정보고 양식에 따라 작성하여 매주 수요일 18:00까지 제출한다.

2) 월간 공정보고 : 발주청과 협의하여 매월 협의일자 기준으로 업무수행 사항 및 예정사항을 [서식 12] 월간 공정보고 양식에 따라 작성하여 매월 첫째주 수요일 18:00까지 제출한다.

3) 수시 보고 : 설계용역 진행 중 문제점 및 협의사항이 발생할 시 즉시 문제점을 분석하여 수시로 제출한다.

다. 업무 회의

1) 용역 수행자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주청과 협의하고자 하는 경우 책임기술자로 하여금 협의하도록 한다. (단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.)

2) 용역 수행자는 자문회의 등 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료를 작성하고 회의에 참석토록 한다.

3) 용역 수행자는 설계 진행시 문제점이 발생하거나 회의가 필요할 때 보고에 필요한 자료를 작성·배부하며 보고회의는 상호간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

4) 당선안을 토대로 최적안이 확정되기까지 발주청이 요구하는 회의에 적극적으로 협조하여 최적안이 확정되도록 한다.

3.4 기성 및 준공검사

가. 기성검사

1) 기성검사는 기본설계검사 완료 후 요청할 수 있으며, 기본설계검사 요청 시 [서식 10](기본, 실시) 설계 검사원을 작성하여 제출한다.

2) 기본설계 완료에 대한 기성금은 총용역비의 50%까지 청구할 수 있다.

나. 준공검사

1) 준공검사는 본용역의 모든 과업을 완료 후 요청할 수 있으며, 준공검사 요청 시 [서식 10](기본, 실시) 설계 검사원을 작성하여 제출한다.

2) 본 계약금액 중 정산대상에 해당하는 항목은 그 증빙서류를 제출하며, 실제 투입된 금액대로 정산 후, 준공금을 지급한다.

3.5 설계 시 준수사항

가. 보안사항 준수

1) 용역 수행자 및 협력업체는 용역 착수시 보안각서와 보안계획서를 제출해야한다.

2) 용역 수행자는 본 과업이행요청서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위해 이용할 수 없다.

3) 「지방자치단체용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건」제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 모든 설계도서는 배포 또는 복제가 필요한 경우 발주청과 협의해야 하며, 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출 시켜서는 안 된다.

4) 용역 수행자는 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임을 진다.

나. 건축법 및 관련 법규 검토

1) 본 설계용역을 수행함에 있어서 건축법 및 기타 제반법규에 합당한다.

2) 설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의한다.

3) 각종 법규나 기술기준은 설계 납품일을 기준으로 준수하여 적용한다.

다. 관계기술자 협력

1) 「건축법 시행령」제91조의3(관계전문기술자와의 협력) 및「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제2조(관계전문기술자의 협력을 받아야 하는 건축물)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

2) 「건축법 시행령」제91조의3(관계전문기술자와의 협력) 및 「같은법」제32조(구조 안전의 확인) 에 따라 구조기술사와 협력하여 구조의 안전을 확인(지진에 대한 구조안전 포함)하며, 협력한 구조기술사는 설계도서에 설계자와 함께 서명 날인 하여야 한다.

라. 에너지절약형 건축물 설계

1) 관련 규정

가) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2020-197호)

나) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2017-881호)

다) 고효율 기자재 보급촉진에 관한 규정 (산업통상자원부 고시 제2021-166호)

2) ‘건축물의 에너지절약 설계기준’에 따라 설계

가) 사전협의 내용

- 에너지절약형 설계

- 고효율에너지 기자재 사용

나) 제출서류

- 건축협의 시 제출하는 에너지절약계획서에 준용하는 도면과 근거서류

- 공공기관 신축건물 에너지 관련 사업협의 신청서

- 고효율에너지기자재 적용 Check List

- 관련자료 USB

- 기타 증빙서류

☞ 평가 진행 중 필요 시 서류 보완 및 설계 수정

3) 건축물 에너지효율 등급 인증에 관한 신청서, 근거서류 등 작성

마. 건축디자인 품질관리

1) 수급인은 건축디자인 향상 및 평가를 위한 디자인 자문회의에서 제시한 설계의 기본방향 및 수준 결과를 숙지하고 이를 설계에 반영

2) 신·재생에너지 설치를 위한 설비시설물은 건물 전체 디자인과 조화되도록 계획

바. 그 외 준수사항

1) 본 과업을 수행하는 동안 기본 설계자 및 기계, 전기, 통신, 소방 설계자는 상호간 충분한 협의를 거쳐 발주청이 요구하는 목적물의 설계가 될 수 있도록 하며, 상호 도면 간 일치화 시켜 공종별 간섭이 되지 않도록 한다.

2) 소방 부분의 설계는 기계 분야 및 전기분야로 분리하여 설계한다.

3) 전기·통신·소방설비는「정보통신 공사업법」,「소방시설 공사업법」,「전력기술 관리법」등 관계 법령에 따라 자격 있는 자가 설계한다.

4) 기계·전기·조명설비 기자재는「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 따라 고효율에너지 기자재를 적극 도입하고, LCC(Life Cycle Cost)를 고려한 장비 선정을 한다.

5) 제3자의 특허권이 있는 공법을 적용할 경우 특허권 사용에 관한 권리를 증명할 수 있는 관련 자료(특허권 협약서 등)를 반드시 제출하며, 공사 중 또는 공사 완료 후 특허권에 따른 분쟁 발생 시 수급자는 이에 대한 모든 책임(소송 및 변상)을 진다.

6) 건축·기계·전기 분야의 설계는「건축물의 에너지절약 설계기준」에 적합하도록 설계한다.

7) 본 과업에 선진사례 및 전문기술을 활용키 위하여 선진시설 견학 및 사례를 검토하여 충분한 자료수집 후 신기술 등을 본 설계에 반영한 시설이 되도록 한다.

8) 본 과업을 수행함에 있어 현장을 필히 답사하여 진입로 등 주변 여건을 설계에 반영한다.

Ⅳ. 분야별 설계지침

4.1 일반 사항

가. 설계도서 일반지침

1) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안되며 감독원과 협의에 따라 이행한다.

2) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 설계한다.

3) 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

4) 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

5) 용역 수행자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전 조사시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상 관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영한다

6) 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

7) 설계도서(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등)는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거 등 공종별로 분리하여 작성한다.

8) 건축(구조, 토목, 기계, 조경), 전기, 통신, 소방, 철거, 폐기물처리로 발주단위를 분리하여 원가계산서를 작성한다.

9) 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방도면은 발주청의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 한다.

10) 각 공종별 충분한 협의를 통해 상호 도면간 공종별 간섭이 되지 않도록 한다.

11) 「건축사법」제21조(설계도서등의 서명날인)에 따라 설계도면에는 참여 기술자의 성명을 기재하고 날인한다.

12) 설계도서의 작성 및 제출에 관한 제반사항은「건축물의 설계도서 작성기준」을 준용한다.

13) 기타 발주청의 요구사항을 적극 반영한다.

나. 설계도서의 표기

1) 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는「용역계약일반조건」제5조(사용언어)에 의한다.

2) 표기문자 및 숫자는 한글 및 아라비아숫자 사용을 원칙으로 하되, 이해가 곤란한 경우에는 영문 및 한자로 표기할 수 있다.

3) 소수점 이하의 숫자가 있을 경우 셋째자리에서 반올림 한다.

4) 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

4) 모든 설계도서에 작성되는 각 실의 명칭 등은 서로 동일한다.

5) 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1~2회 사용되는 경우 원어 사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용한다.

6) 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

가) 건축도면 : A

나) 건축구조도면 : S

다) 토목도면 : C

라) 조경도면 : L

마) 기계설비도면 : M

바) 전기도면 : E

사) 통신도면 : ET

아) 소방도면 : MF(소화설비), EF(전기소방)

다. 설계도면 작성

1) 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명, 날인한다.

2) 도면은 AUTO CAD로 작성하며, 파일 제출 시 CAD 및 PDF 형태 모두 제출한다.

3) 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 하며 필요에 의하여 A1을 사용할 수 있다.

4) 축적은 실시설계의 축적에 따르되, 도면에 적합한 통상적인 축적을 사용하고 동일 종류에 대하여는 통일시켜야 한다.

5) 각 공종마다 도면목록을 작성하고 방향표시, 단면표시, 상세표시(키플랜) 및 보기를 넣어 쉽게 해당부분을 찾을 수 있도록 한다.

6) 모든 도면상에는 종 또는 횡의 열 부호를 표시한다.

7) 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

8) 설계도면은 누락된 부분이 없고 현장 기술자들이 쉽게 이해하여 정확하게 시공할 수 있도록 상세히 작성한다.

9) 마감재료는 부재명, 재료명, 규격(두께×너비×길이), 마무리, 색 등을 표시한다.

10) 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 한다.

가) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

나) 각종 부착시설물의 표시

다) 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 기타 부대설비와 관련하여 명확한 구분 표시

라) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성하고, 공인기관 기술검토서를 첨부하도록 한다.

11) 조감도, 투시도 및 색체디자인 기본계획(내·외장재 색체기본계획을 설계도서에 표시)을 작성한다.

라. 설계설명서 작성

1) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

2) 설계개요

가) 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률

나) 주차면적, 조경면적

다) 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도

3) 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사한 내용 표기

4) 기타 각 공종에 대한 설명 및 고려사항 등

마. 시방서 작성

1) 일반 공통 시방 및 특기시방으로 구분하여 시방서를 작성하되, 일반사항은 국토교통부 제정 공사시방서 작성요령을 준용하고 특기시방서는 일반시방서에서 정하지 않은 시공시 유의사항 및 특별주문사항 등을 구체적으로 명시한다.

2) 일반 시방서 및 특기시방서는 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 구분하여 작성한다.

3) 시공자가 시공 상태를 검토, 확인 받아야 하는 대상공종을 특기 시방서에 명시한다.

바. 내역서 작성

1) 공사비 총액은 공사원가금액(자재비, 노무비, 일반관리비, 이윤 등의 합산액)으로 하되, 부가가치세를 포함한 금액으로 한다.

2) 설계에 반영되는 자재와 공법을 면밀히 검토하여 최대한 공사비를 절감

3) 물가는 조달청 고시 가격을 원칙으로 한다.

4) 조달청 미수록 단가는 기획재정부에 등록한 전문 가격조사 기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 가격을 적용한다.

5) 견적단가를 적용할 시는 반드시 견적서 원본을 제출(타인견적 2부 포함)한다.

6) 노임은 당해 연도 고시 노임단가를 적용한다.

7) 공사비 적산은 정부 표준품셈 및 건축공사 적산기준에 따라 산정한다.

8) 외국수입자재인 경우에는 수입견적자의 견적서(타인견적 2부 포함)로 설계한다.

9) 「건설기술진흥법」의 산출기준에 따라 안전관리비 및 품질관리비 등을 내역서에 계상

10) 모든 가시설물은 시공이 가능하도록 충분하게 설계하고 내역서에 반영하도록 한다.

사. 관급자재 및 주요자재

1) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 공사용 자재 직접구매 대상품목인 경우 관급자재로 지정하야야 한다.

2) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계한다.

3) 각종 자재의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상, 질감, 무늬 등의 기능에 적합한 환경 친화적인 자재 및 경제적인 자재를 사용한다.

4) 자재 및 장비선정 시 설계의 의도와 부합되지 않는 한 조달청 우수제품 및 신기술제품 등의 사용을 검토한다.

5) 사용자재는 KS제품 사용을 원칙으로 하며, 국내 자재 중 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주청과 협의하여 선정한다.

6) 소방관계법에 의한 방염기준을 적용한 자재를 사용한다.

7) 지급자재는「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」을 만족하며, 지급자재 목록 등 중요사항에 대하여 발주청과 사전에 협의한다.

8) 설계도면에 주요자재의 구체적 업체 상호 및 상표 등을 명시하지 않도록 한다.

9) 부득이 수입자재 등을 사용 시에는 사전에 발주청과 협의하여 결정한다.

아. 예정공정표 작성

1) 예정공정표는 전체 공정을 포함하여 보할공정표의 형태로 작성한다.

2) 예정공정표는「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따른 공사기간을 토대로 작성

자. USB 제출

1) 설계도면은 CAD 프로그램으로 작성하며, PDF 전환 파일도 함께 제출한다.

2) 공사내역서 및 산출근거는 EXCEL 프로그램으로 작성한다.

3) 기타 설계도서(설계설명서, 시방서, 계산서 등)는 한글 프로그램으로 작성한다.

4) 본 용역과 관련된 모든 설계도서 및 제반서류는 전부 파일로 제출하도록 한다.

차. 종결보고서 작성

1) 종결보고서에는 설계에 참여한 참여자 모두 확인 날인을 한다.

2) 설계내용, 공사개요, 추진경위, 계약현황, 설계추진과정, 참여기술자 현황(성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등), 하수급인 현황, 유지관리 계획서, 납품설계서 목록 등이 포함되어야 한다.

4.2 건축분야 설계지침

가. 일반 사항

1) 현장을 답사하여 현장조건을 조사 한 후 현장 대지조건을 검토하여 용도에 적합한 효율적인 배치 및 조성계획이 되어야 한다.

2) 기능 및 건축구조가 적정하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

3) 용도와 기능에 적합한 설계를 통한 공간계획과 각실별 기능이 연계된 평면계획이 이루어질 수 있도록 한다.

4) 방수, 방습, 단열, 차음, 냄새 차단 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

5) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획 단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비의 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보한다.

6) 공기단축과 공사비를 절감할 수 있는 새로운 검증된 공법과 첨단기술 등을 적극 도입하여 완벽한 공사가 되도록 한다.

7) 외부의 이질마감재료 간의 Joint 부분이 밀실하게 시공되도록 도면을 구체적으로 표기하고, 누수문제가 발생하지 않도록 충분한 검토를 한다.

8) 방수 및 누수에 관한 공법 및 사용자재 선정은 발주청의 승인하에 진행토록 한다.

9) 세부 시설계획의 내용이 충분히 반영될 수 있도록 계획한다.

10) 가시설물에 대한 검토를 충분히 하여 시공시 문제점이 발생하지 않도록 한다.

나. 건축계획 시 준수사항

1) 건축허가(협의)시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

2) 대지 내에서 혼잡성이 최소화되도록 계획하여 대지의 효율성이 극대화되도록 하고, 각 프로그램이 유기적인 관련성 및 독립성을 가질 수 있도록 계획되어야 한다.

3) 대지의 입지와 형태를 고려하여 접근성과 가로경관을 고려한 건축물 위치, 형태, 입면디자인을 계획한다.

4) 건물 외부형태 및 색상은 특성을 살릴 수 있도록 하고, 특히 주변시설과 조화를 이룰 수 있도록 계획한다.

5) 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 발주자의 기획과 의도를 반영,합리적이고 구체적인 다양한 시행방안(규모, 타당성, 예상사업비 등)을 제시하여야 한다.

다. 평면계획

1) 기능별·층별 조닝(zoning)을 통해 공간이 상호 유기적으로 연계하도록 계획하여야 한다. 이 때 명쾌한 동선분리로 혼잡이 발생되지않도록 한다.

2) 건축물의 이용을 극대화할 수 있도록 계획하며, 피난규정 등 제반법규에 적합하도록 계획한다.

3) 각 종 시설물은 최소인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 한다.

4) 향후 수요 증가에 따른 증축 가능성을 고려하여 계획한다.

라. 교통 및 동선계획

1) 건축물 전체의 동선계획은 이용자의 이용 목적에 따라 용이한 동선체계가 이루어져야 하며

주출입 동선과 연결되는 도로의 교통 지장을 최소화 할 수 있는 방안을 검토한다.

2) 입구, 실내진입, 로비 등 모든 곳에는 문턱을 설치하지 않으며, 어린이· 장애인·노약자에게 시설 사용의 장애가 없는 Barrier Free환경을 제공한다.

3) 차량 진입 동선은 도시계획 도로 현황을 고려하여 안전하고 효율적으로 계획한다.

마. 구조 계획

1) 기존건축물의 주요구조부에 대한 철거시 구조안전진단을 고려한 계획

2) 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」에 따른 구조 및 내진설계

3) 구조보강에 대한 설계는 경제적이고 합리적이며, 주변부지에 영향을 최소화 할 수 있는 공법으로 선정하며, 공법선정은 반드시 발주청과 협의하여 결정

바. 재료 및 색상계획

1) 사용재료는 친환경적이고, 내구성 및 유지관리가 우수한 것으로 설계한다.

2) 창의 크기는 개방감과 실의 기능 및 에너지효율 등을 충분히 고려한 크기로 계획한다.

3) 외관의 재료 및 형태는 시간이 지남에 따라 잘 오염되지 않는 재료로 계획한다.

4) 건물 전체의 주변과 조화를 해치지 않는 범위에서 색채계획을 한다.

마. 건축도면 작성 특기사항

1) 평면도의 각 실의 실명, 실 번호 및 실 면적(중심선 기준)을 직접 기입한다.

2) 중요한 부분은 반드시 부분 상에 평면 전개도 및 단면 부분 상세도를 작성한다.

3) 중요한 부분은 천장평면도를 작성하고 크기가 같은 동일형 실의 천장은 단위 천장 평면도를 작성한다.

4.3 토목분야 설계지침

가. 일반 사항

1) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 건물까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획 설계에 필요한 자료를 제공한다.(필요시 발주청과 협의를 통해 조정 가능함)

2) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 등을 면밀히 사전에 조사 분석한다.

3) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획 평면도는 세분하여 작성한다.

4) 공법 및 재료의 선택 등은 인근에 유해한 영향이 가장 적게 미치는 것으로 하고 비교·검토하여 가장 적합한 공법과 재료를 선택, 사용한다.

5) 건축설계도서를 바탕으로 토목 설계도서가 반영될 수 있도록 작성한다.

나. 토공 및 흙막이 설계

1) 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 양질의 토사를 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획한다.

2) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영한다.

3) 추후 실제 토사 반출량에 대한 정산이 가능하도록 설계도서를 상세히 작성한다.

4) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성(Trafficability)을 확보토록 한다.

5) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계한다.

6) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지반조사 결과 또는 관련 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하며 적용근거를 첨부한다.

7) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영한다.

8) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하며 공법선정은 반드시 발주청과 협의하여 결정한다.

다. 구내 우․오수 설계

1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계한다.

2) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영한다.

3) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정한다.

4) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

5) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치한다.

6) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리하는 분류식으로 한다.

7) 하수도의 형상 및 규격은 합리성 및 경제성을 감안하여 검토하며 이용시 하수유출이 되지 않는 수밀공법과 수밀시험이 가능하도록 재료 등을 사전에 발주청의 승인 후 설계

8) 하수도 구배는 부유물의 침전이 없고 하수가 누수 되지 않도록 하며 역류영향 등을 세밀히 검토하여 결정한다.

9) 하수도 기초공사는 지반의 종류에 따라 관의 침하 등을 감안하여 설계한다.

10) 추후 주변 부지 및 도로로 우수가 범람하지 않도록 설계 최대 유량에 여유를 두어 설계하도록 한다.

라. 도로 및 포장 설계

1) 부지 내 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하며 주변 도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치한다.

2) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영한다.

3) 도로 및 주변광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치한다.

4) 포장공법(AASHTO 도로포장 설계법) 및 포장구조를 검토하여 경제적이고 실용적으로 설계한다.

5) 지반조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 주변도로 및 포장 설계 시 P.P. Mat 및 PET Mat 등 적용을 검토한다.

6) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하게 한다.

7) 포장재료의 선정은 환경 친화적이고 투수성이 있는 재료를 선정 검토하여 발주청과 협의 후 설계에 반영한다.

8) 보차도 및 대지 경계 블럭의 규격 및 종류의 결정은 발주청과 협의 결정한다.

마. 기타

1) 부지 경계부근은 도로, 인접 토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치한다.

2) 석축 및 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계(구조 계산서 첨부)한다.

3) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정한다.

4) 사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영한다.

5) 보도블럭, 데크 등 설치 자재에 대한 자연친화적 제품 선정 반영한다.

6) 부지조성에 필요한 기타시설의 설치가 요구되는 경우 발주청과 협의 후 결정한다.

바. 토목도면의 작성 특기사항

1) 종단도의 종·횡 축척은 추후 협의하여 결정한다.

2) 횡단면도 작성은 추후 협의하여 결정한다.

3) 건물주위 및 구조물 설치로 단 차이가 있는 부분은 단면도를 설계한다.

4) 설비 부분의 오․폐수, 배수 배출구를 정확히 파악하여 설계한다.

5) 설계도서에서 각 부위의 치수, 사용재료의 종류 및 품질등급, 시공법 등 명시한다.

4.4 기계분야 설계지침

가. 일반 사항

1) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 기타 조건에 적합하게 설계한다.

2) 기본조사(급수, 도시가스, 오폐수 등)를 하여 설계에 반영한다.

3) 모든 기계설비는 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택한다.

4) 주요장비는 설계 전 반드시 발주청의 지침을 받아 설계를 진행한다.

5) 건축설계도서를 바탕으로 기계 설계도서가 반영될 수 있도록 작성한다.

나. H.V.A.C.(Heating Ventilating Air Conditioning) 설비

1) 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계한다.

2) 냉․난방 시스템은 경제성을 비교하여 가장 합리적이고 효율적인 방식을 택하여 설계한다.

3) 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계한다.

4) 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 가능토록 고려하여 설계한다.

5) 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계한다.

다. 위생설비

1) 급수방식은 현장상황에 따라 발주청과 협의하여 반영한다.

2) 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보한다.

3) 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

4) 지역난방, TES, CES 등에 따른 급탕방식은 그 방식의 기준을 따른다.

5) 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려한다.

6) 위생기구는 K.S 제품 또는 동등 이상 품을 사용한다.

라. 자동제어설비

1) 자동제어설비는 건물규모에 적합하며, 최신 시스템을 도입하도록 한다.

2) 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 한다.

3) 각 동의 시스템이 한곳의 통제실에서 제어가 되도록 설계

마. 상수도

1) 상수도 관련기준 및 조례를 검토하여 발주청과 협의하여 결정한다.

2) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

3) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계한다.

4) 관 매설 깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 결정한다.

5) 관 보호공, 이형관, 보호공 기타 구조물 설치는 발주청과 협의 결정한다.

6) 관종 및 접합은 경제성과 유지관리 등을 감안하여 결정한다.

7) 용량을 검토하여 경제적이고 안정된 급수가 되도록 한다.

바. 기계도면 작성 특이사항

1) 옥내 주배관은 반드시 종․횡단면을 작도하여 중요부분에 별도로 표시하고 배관의 구배 표시한다.

2) 평면도에서 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 설치 및 부분상세를 반드시 작도한다.

3) 자동제어 시스템 장치 계통은 평면도, 계통도 다이아그램으로 표시한다.

4) 각종 제품은 정확한 제작도면을 작도한다.

4.5 조경분야 설계지침

가. 일반 사항

1) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 건물, 주차장 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획한다.

2) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획한다.

3) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간을 종합적으로 고려하여 계획한다.

5) 시설의 이용자의 편의 및 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계한다.

6) 건축설계도서를 바탕으로 조경 설계도서가 반영될 수 있도록 작성한다.

나. 조경 수목

1) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정한다.

2) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영한다.

3) 단지내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계한다.

4) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 거리를 확보한다.

5) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

6) 병충해, 전정, 동절기 보온 등 유지관리가 용이한 수목을 선정한다.

7) 오염에 강하고 계절감이 있는 수목구성으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

다. 조경 시설물 등

1) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하도록 한다.

2) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적인 재료를 사용한다.

3) 필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하며, 이 경우 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려해야 한다.

4) 분수대, 벽천, 수공간의 설계는 자연친화적으로 느낌을 갖도록 디자인을 계획하며 협의 후 설계를 진행한다. 전문 업체에 협조를 받아 설계할 수 있으나 급·배수에 지장이 없도록 관련공종과의 관계를 확인하여 이상이 없도록 하여야한다.

5) 케이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인 또는 적용안의 설치 위치는 계획안을 작성하여 발주청과 협의하여 결정한다.

4.6 전기분야 설계지침

가. 일반사항

1) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족한다.

2) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려한다.

3) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

4) 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용한다.

5) 건축설계도서를 바탕으로 전기 설계도서가 반영될 수 있도록 작성한다.

나. 수변전 설비공사

1) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

2) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기한다.

3) 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

다. 동력 설비공사

1) 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정한다.

2) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정한다.

3) 역류개선용 콘덴서를 부착토록 설계한다.

4) 전기설비기준에 적합한 접지방법으로 설계한다.

라. 조명 설비공사

1) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성한다.

2) 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 실폭 등을 고려한다.

3) 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토한다.

4) 에너지 절약형 등기구 선정 및 배치(최대한 자연광을 이용하여 설계)등을 고려하여 계획안을 발주청과 협의 결정한다.

마. 전열 설비공사

1) 전열설비는 전열기기 사용이 편리하도록 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계한다.

2) 용도에 알맞은 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

바. 전기도면 작성 특이사항

1) 평면도는 반드시 전등, 전열, 동력, 간선 등으로 세분화하여 각각 작도한다.

2) 중요한 부분은 반드시 평면상세, 단면 부분상세도로 작도한다.

3) 각종 제어반의 결선도 내부 및 외부상세도를 확실하게 작도한다.

4) 각종 제작품은 확실한 제작도면을 작도한다.

5) 평면도에 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 반드시 설치 및 부분상세도를 작도한다.

6) 평면도에 각 실명을 기입한다.

4.7 통신분야 설계지침

가. 일반 사항

1) 시설 및 사무실의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보한다.

2) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

3) 설계시 방재, 보안에 대한 고려를 한다.

4) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계한다.

5) 각 동별 개별적으로 방범 및 보안관리가 가능하도록 설계한다.

6) 건축설계도서를 바탕으로 통신 설계도서가 반영될 수 있도록 작성한다.

나. 통합배선 설비공사

1) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보한다.
2) 통신실의 설치조건 및 위치를 검토한다.
3) MDF/IDF의 위치, 규모 및 접지를 검토한다.
4) 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영한다.

다. 약전 설비공사
1) 방송설비, A/V설비를 검토한다.
2) MATV설비, CATV설비를 검토한다.

3) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

4) RFID 기반 청사관리 시스템 구축 등을 고려하여 계획안을 발주청과 협의 결정한다.

라. 통신도면 작성 특이사항

1) 평면도는 반드시 전화, LAN, TV, 방송 등으로 세분화하여 각각 작도한다.

2) 중요한 부분은 반드시 평면상세, 단면 부분상세도로 작도한다.

3) 각종 제어반의 결선도 내부 및 외부상세도를 확실하게 작도한다.

4) 각종 제작품은 확실한 제작도면을 작도한다.

5) 평면도에 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 반드시 설치 및 부분상세도를 작도한다.

6) 평면도에 각 실명을 기입한다.

4.8 소방 분야 설계지침

가. 일반사항

1) 소방시설은 기계(소화) 및 전기(소방)로 분리하여 설계도서를 작성한다.

2) 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모한다.

3) 건축설계도서를 바탕으로 소방 설계도서가 반영될 수 있도록 작성한다.

나. 화재경보설비

1) 자동화재 탐지설비를 설계에 반영한다.

2) 주수신반은 중앙공급실과 연동이 되고 부수신반은 상시 근무자가 있는 곳에 설치하며, 비상방송 연동회로를 내장한다.

3) 감지기 종류 및 수량은 용도와 면적에 맞게 충분히 설계한다.

4) 각 층별 발신기 설치는 법정 수용거리 이내에 두고, 기계설비의 소화전과도 연동한다.

5) 방재설비와 관련된 전원을 검토한다.

다. 유도등 설비

1) 용도 및 장소별로 피난구 유도등과 통로 유도등을 설치한다.

2) 화재시 시설내 이용자들이 빠르고 안전하게 대피할 수 있도록 적절한 검토한다.

라. 소방도면 작성 특이사항

1) 평면도는 자동화재탐지설비, 유도등설비, 배연설비, 제연설비 등으로 세분화 작도한다.

2) 경계구역 및 구역일람표를 작성한다.

3) 중요한 부분은 반드시 평면상세, 단면 부분상세도로 작도한다.

4) 각종 제어반의 결선도 내부 및 외부상세도를 확실하게 작도한다.

5) 각종 제작품은 확실한 제작도면을 작도한다.

6) 평면도에 표시 및 식별하기 곤란한 부분은 반드시 설치 및 부분상세도를 작도한다.

7) 평면도에 각 실명을 기입한다.

4.9 에너지절약계획

가. 건축물의 효율적인 에너지관리를 위한 열손실방지 등의 에너지이용합리화를 위한 조치는「녹색건축물 조성 지원법」, 「건축물의 에너지절약설계기준」 및 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 적합할 뿐만 아니라, 에너지절약형 및 고효율에너지 기자재를 설치하도록 설계하여야 한다.

나. 신·재생에너지, 빗물재활용시스템 설치 등 미래지향적·친환경·에너지 절약형건축물을 지향하여 주변환경과 조화를 이루면서 건축물 에너지 효율을 높인 친환경 건축계획을 구현한다.

다. 건물의 방위에 따른 배치, 용도 및 사용시간 등에 근거하여 평면계획과 조닝계획, 건축 구조체 축열 및 축냉 효과를 활용할 수 있는 시스템을 고려하여 설계한다.

라. 건물의 방위설정은 건물에의 접근, 대지의 고저 및 향, 조망, 통풍, 냉난방 등을 감안하여 설정하되, 계절별 특성과 태양 궤적, 풍향 등을 감안하여 자연에너지를 최대한 활용할 수 있도록 실 배치, 창호 등을 계획한다.

마. 반투명·투명, 낮은 내부 칸막이를 이용하고 창의 형태 등을 검토하여 주광의 집성을 극대화한다.

바. 외벽, 지붕, 창호 등에서 발생하는 열교현상을 최소화하고, 외부 출입구에는 방풍실을 계획한다.

사. 절수기기(절수용 변기, 절수용 음수대 등 )설치를 적극 도입 계획한다.

4.10 무장애 계획

가. 장애인, 고령자, 임산부 및 영유아 등 사회적 약자(교통약자)가 쉽게 이용할수 있도록 유니버설디자인(Universal Design) 요소를 고려한 공간을 계획한다.

나. 무장애 계획은 이용자의 접근성, 안전성, 식별성에 목표를 두고 설계하고 비장애인은 물론 장애인이 이동할 때 불편함이 없도록 건물 내·외부공간에 장애물이 없도록 한다.

다. 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free)인증지표 및 심사기준에 따른 예비인증을 취득할 수 있는 수준으로 계획하여야 한다.

라. 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 및 관련법령의 기준에 적합하게 설계한다.

4.11 기타사항

가. 다수가 이용하는 건물임을 고려하여 색채, 사인계획, 휴게공간, 장애인주차장 등의 외부공간과 주동선 상의 주요 실, 출입구, 화장실 등의 내부 공간 계획, 코어계획(승강기, 화장실, 계단 등) 화재 및 비상 시 대피동선 등의 계획 시 ‘유니버설 디자인’ 및 ‘장애물 없는 생활환경 인증’기준을 적용한다.

나. 생애주기를 고려한 지속가능한 건축물 조성을 위한 공간구성, 외관, 설비계획안을 제시한다.

다. 각종 재난, 사고 등에 대응 가능한 안전한 건축물로 계획한다.

라. 각종 시설물은 중앙 집중관리 및 통제가 편리하여 최소 인원으로 관리할 수 있도록 계획한다.

마. 에너지절약계획서를 포함한 각종 인증(장애인편의시설관련 등)을 고려한다.

바. 공기단축, 건설원가 절감, 준공 후 유지관리비 및 운영계획을 충분히 고려하여 계획한다.

사. 모든 관계법규(입법예고사항 포함) 및 제반규정에 대하여 적합하게 계획한다.

아. 설계 시 LCC(Life Cycle Cost)분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감 방안 마련 권장한다.

자. 지속가능한 건축물이 될 수 있도록 친환경 건축 및 에너지 소비 최소화 계획을 수립한다.

차. 각종 범죄의 발생 증가에 따라 안전한 건축물의 건축을 위하여 국토교통부 고시 (제2021-930호) 『범죄예방 건축기준』 및 국토교통부 지침(2013.1.9)『건축물의 범죄예방 설계(CPTED) 가이드라인』에 맞게 설계한다.

카. 시스템 냉・난방 시스템 적용 시 기계실의 적정 면적 검토하며, 하중을 고려하여 설계한다.

Ⅴ. 과업 단계별 지침

5.1 기본(중간)설계 지침

가. 정의

“기본설계”(본 과업에서는 중간설계와 동일한 의미)라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량 등이 구체화된 설계 도서를 작성하여 발주청으로 부터 승인을 받는 단계를 말한다.

나. 일반 사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산에 따른 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주청의 승인을 받는다.

6) 설계도서는「건축물의 설계도서 작성기준」의 도서내용에 따라 작성한다.

5.2 기본(중간)설계 도서

가. 건축

1) 개략 시방서 : 공사용 시방서(초안) 작성

2) 개략 공사비 : 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략공사비를 산정하여 작성

3) 설계도면

도 면		내 용
도면 목록표
안내도		- 방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록
구적도		- 대지면적에 대한 기술
실내재료마감표		- 바닥, 벽, 천장 등 실내마감
투시도		- 투시도 또는 조감도
배치도		- 축척 및 방위, 대지의 고저차 - 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭 - 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지 거리 - 신청건물과 기존건물과의 관계 - 부대시설물과의 관계
주차 계획도		- 법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표 - 주차배치도 및 차량 동선도 - 차량진출입 관련위치 및 구조 - 옥외 및 지하 주차장 도면
각층 및 지붕 평면도		- 기둥‧벽‧창문 등의 위치 / - 복도, 계단, 승강기 위치 - 방화 구획 및 방화벽의 위치
입면도(2면 이상)		- 주요내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수 - 외부 마감재료
단면도(종․횡단면도)		- 건축물 최고높이, 각층 높이, 반자높이 - 천장내 배관 공간, 계단등의 관계를 표현
수직동선 상세도	코아 상세도	- 코아 내의 각종 설비관련 시설물의 위치
	계단평면 ․ 단면상세도
	주차경사로 평 ․ 단면상세도
부분 상세도	지상층 외벽 평․입․단면도
	지하층 부분 단면상세도
천장도	천장 평면도
창호 평면도

나. 구조 (해당시)

1) 개략 시방서 : 구조 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성

2) 구조 계산서

가) 설계 근거기준

나) 구조 재료의 성질 및 특성

다) 제반 하중조건에 대한 분석

라) 지진에 대한 안정성 검토

라) 각부의 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

마) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

바) 가시설물에 대한 구조검토

3) 설계도면

가) 도면 목록표

나) 기초 일람표

다) 구조 평면도 : 기초에서 옥탑까지 작성

라) 가구도 : 골조의 단면상태를 표현하는 도면으로 골조의 상호 연관관계 표현

마) 앵커 배치도 및 Base Plate 설치도

바) 기둥 일람표

사) 보 일람표

아) 슬래브 일람표

자) 옹벽 일람표

차) 계단배근 일람표

카) 잡배근 일람표

타) 주심도

다. 토목 (해당시)

1) 개략 시방서 : 토목 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성

2) 개략 공사비 : 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략공사비를 산정하여 작성

3) 각종 계산서 : 유역산출 면적표 등

3) 설계도면

가) 도면 목록표

나) 각종 평면도 : 주요시설물 계획

다) 대지 종·횡 단면도

라) 토공사 계획도

마) 포장계획 평·단면도

바) 보도블럭 평면도

사) 담장 계획도

아) 우·오수배수처리 평·종단면도

자) 상하수 계통도

- 우·오수 배수처리 구조물 위치 및 상세도

- 공공하수도와의 연결방법

- 상수도 인입계획

라. 기계

1) 개략 시방서 : 기계 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성

2) 개략 공사비 : 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략공사비를 산정하여 작성

3) 개략 부하 계산서 : 설계기준에 따라 단위면적당 부하를 기준

4) 각종 장비 선정서 : 부하 분석에 따른 적정 장비 선정

5) 설계도면

가) 도면 목록표

나) 장비 일람표 : 규격, 수량 등을 상세히 기록

다) 장비 배치도 : 기계실, 공조실 등의 장비배치 방안 계획

라) 공조배관설비 계통도

마) Duct설비 계통도

바) 위생, 설비 계통도

사) 저수조 및 고가수조 : 저수조 및 고가수조의 설치기준을 표시

아) 설비용 Pit 평면 상세도 : 설비용 핏트 상세 및 배치계획도면

자) 도시가스 인입 확인

차) 기구 상세도 : 기구의 선정

마. 조경 (해당시)

1) 개략 시방서 : 조경 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성

2) 개략 공사비 : 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략공사비를 산정하여 작성

3) 설계도면

가) 도면 목록표

나) 조경 배치도

- 법정 면적과 계획면적의 대비

- 조경계획 및 식재 상세도

다) 식재 평면도

라) 단면도

마) 조경 시설물 계획도 : 조형물, 파고라, 벤치, 자전거 보관대, 안내판 등

바. 전기

1) 개략 시방서 : 전기 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성

2) 개략 공사비 : 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략공사비를 산정하여 작성

3) 개략 부하 계산서 : 용도별 조도, 부하계산서 작성

4) 각종 장비 선정서 : 부하 분석에 따른 적정 장비 선정

5) 설계도면

가) 도면 목록표

나) 배치도 : 옥외조명 설비 평면도

다) 전력 계통도

라) 조명 계통도

마) 조명 평면도

바) 조명기구의 선정

사. 통신

1) 개략 시방서 : 통신 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성

2) 개략 공사비 : 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략공사비를 산정하여 작성

3) 개략 부하 계산서 : 회선 용량, TV 전계강도, DVR 용량, 앰프 용량, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서

4) 각종 장비 선정서 : 부하 분석에 따른 적정 장비 선정

5) 설계도면

가) 옥외간선도

- 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도

-  국선인입지점 및 경로

- 통신설비의 연결지점 및 단자

- 구내설비와의 연결방법

나) 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치 계획도

다) 각종 설비 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신설비 및 기타 필요설비의 계통도

라) 각종 설비 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요설비의 배치도

아. 소방

1) 개략 시방서 : 소방 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성

2) 개략 공사비 : 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략공사비를 산정하여 작성

3) 각종 장비 선정서 : 부하 분석에 따른 적정 장비 선정

4) 설계도면

가) 소화 설비 계통도

나) 소방 설비 계통도

다) 소화 설비 평면도

라) 소방 설비 평면도

5.3 실시설계 지침

가. 정의

“실시설계”라 함은 계획설계 및 기본설계(중간설계)를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계 도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 칫수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주청의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반 사항

1) 기본설계(중간설계)를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시화하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 설계도서는「건축물의 설계도서 작성기준」의 도서내용에 따라 작성한다.

5.4 실시설계 도서

가. 건축

1) 공사 시방서 : 일반시방서, 특기시방서, 관급시방서

2) 공사비 내역서 : 내역서, 관급내역서, 수량산출서, 단가산출서, 일위대가표

3) 설계도면

도 면		축 적
표지
도면 목록표
안내도
구적도
지적도
면적 산출표
대지 종․횡단면도
배치도		1/100이상
주차 계획도		1/100이상
평면도		1/100이상
입면도(2면 이상)		1/100이상
단면도(종․횡단면도 등)		1/100이상
실내벽 및 반자의 마감도		1/100이상
수직동선 상세도	계단 평․단면상세도	1/5～1/50
부분 상세도	주요부분 상세도	1/5～1/50
	출입구 상세도	1/5～1/50
	지상층 외벽 평·입·단면 상세도	1/5～1/100
	지하층 부분 단면 상세도	1/5～1/100
창호도	창호 일람표	1/5～1/50
	창호 평면도	1/5～1/50
	창호 상세도	1/5～1/50
	창호 입면도	1/5～1/50
천장도	각층 천장 평면도	1/5～1/50
실내부위	실내마감 상세도	1/5～1/50
부품도	각 부품도	1/2～1/50

나. 구조 (해당시)

1) 공사 시방서 : 일반시방서, 특기시방서, 관급시방서

2) 구조 계산서

가) 설계 근거기준

나) 구조 재료의 성질 및 특성

다) 제반 하중조건에 대한 분석

라) 지진에 대한 안정성 검토

라) 각부의 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

마) 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

바) 가시설물에 대한 구조검토

3) 설계도면

도 면	축 적
표지
도면 목록표
구조 평면도	1/30 ~ 1/200
구조 단면도	1/30 ~ 1/200
기초 일람표	1/30 ~ 1/100
기둥 일람표	1/30 ~ 1/100
보 일람표	1/30 ~ 1/100
슬래브 일람표	1/30 ~ 1/100
옹벽 일람표	1/30 ~ 1/100
계단배근 일람표	1/30 ~ 1/100
주심도	1/30 ~ 1/200
잡상세도	1/5 ~ 1/50

다. 토목 (해당시)

1) 공사 시방서 : 일반시방서, 특기시방서, 관급시방서

2) 공사비 내역서 : 내역서, 관급내역서, 수량산출서, 단가산출서, 일위대가표

도 면		축 적
표지
설계 설명서
도면 목록표
주요 평면도		필요 축적
대지 종·횡단면도		필요 축적
토공사 평·단면도		1/5 ~ 1/100
흙막이 상세도(굴토깊이 10m 미만)		1/ 5 ~1/50
포장 상세도		1/ 5 ~1/50
옹벽 평·단면 전개도		1/5 ~ 1/100
옹벽 상세도		1/5 ~ 1/100
우·오수 배수 상세도	배수처리 노선 평면도	1/5 ~ 1/100
	배수처리 노선 종·횡단면도	1/5 ~ 1/100
	배수 구조물 상세도	1/5 ~ 1/100

3) 설계도면

라. 기계

1) 공사 시방서 : 일반시방서, 특기시방서, 관급시방서

2) 공사비 내역서 : 내역서, 관급내역서, 수량산출서, 단가산출서, 일위대가표

3) 부하 계산서 : 설계기준에 따라 세부 부하 계산

4) 장비일람표 : 주요장비의 사양을 표기

5) 설계도면

가) 표지

나) 도면 목록표 : 도면목차·번호 등을 알아보기 쉽도록 표기

다) 장비 일람표 : 규격, 수량 등을 상세히 기록

라) 옥외배관 평면도(축적 1/100이상)

- 옥외에서의 급배수·도시가스·유틸리티 등의 인입·인출

- 관경 및 위치 등

마) 각 설비 계통도 : 공조, 환기, 위생 등에 대한 내용(축적 1/100이상)

바) 각 설비 평면도 : 공조, 환기, 위생 등에 대한 내용(축적 1/100이상)

사) 기계실 및 공조실 확대평면도 : 설비별 배관에 대한 확대평면(축적 1/5 ~ 1/50)

아) 화장실 확대평면상세도 : 화장실 배관 등에 대한 확대평면(축적 1/5 ~ 1/50)

자) 저수조·고가수조 배치 및 평·단면도 : 설치기준을 표시(축적 1/5 ~ 1/50)

차) 설비용 Pit 상세도 : 설치 및 유지보수 등을 위한 공간 검토(축적 1/5 ~ 1/50)

카) 연도 상세도 : 보일러 및 발전기 등의 연도 상세(축적 1/5 ~ 1/50)

타) 각종 장비상세도(축적 1/5 ~ 1/50)

파) 자동제어도면

- 구성도

- 장비, 밸브, 관제점, 패널 일람표

- 계통도 및 평면도

마. 조경 (해당시)

1) 공사 시방서 : 일반시방서, 특기시방서, 관급시방서

2) 공사비 내역서 : 내역서, 관급내역서, 수량산출서, 단가산출서, 일위대가표

3) 설계도면

가) 도면 목록표 : 도면목차·번호 등을 알아보기 쉽도록 표기

나) 배치도 : 공사계획 및 시설물 배치도(축적 1/100이상)

다) 평면도(축적 1/100이상)

- 배식 평면도 및 수량 집계

- 포장계획 평면도

- 시설물 평면도

라) 입면도 : 식재 입면도 및 플랜트 전계도(축적 1/100이상)

마) 상세도(축적 1/10이상)

- 포장 평·입·단면 상세도

- 지주목 상세도

- 식재 및 수목보호용 덮개상세도

- 플랜트 상세도

- 시설물 상세도

바. 전기

1) 공사 시방서 : 일반시방서, 특기시방서, 관급시방서

2) 공사비 내역서 : 내역서, 관급내역서, 수량산출서, 단가산출서, 일위대가표

3) 각 부하 계산서 : 변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량 등

4) 장비 일람표 : 주요장비의 사양을 표기

5) 설계도면

가) 도면 목록표

나) 전력 인입 배치도(축적 1/100이상)

다) 전력간선 계통도

라) 전기실 장비설치 평면도(축적 1/100이상)

마) 기계실 장비설치 평면도(축적 1/100이상)

바) 평면도(축적 1/100이상)

- 전력설비 평면도

- 조명설비 평면도

사) 상세도(축적 1/5이상)

- 조명기구 상세도

- 설비용 Pit 상세도

- 피뢰침 상세도

- 접지서리 상세도

- TV안테나 설치 상세도

사. 통신

1) 공사 시방서 : 일반시방서, 특기시방서, 관급시방서

2) 공사비 내역서 : 내역서, 관급내역서, 수량산출서, 단가산출서, 일위대가표

3) 각 부하 계산서 : 회선 용량, TV 전계강도, DVR 용량, 앰프 용량, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서

4) 장비 일람표 : 주요장비의 사양을 표기

5) 설계도면

가) 옥외간선도

- 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도

-  국선인입지점 및 경로

- 통신설비의 연결지점 및 단자

- 구내설비와의 연결방법

나) 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치 계획도

다) 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV 등의 계통도

라) 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등의 배치도

마) 각종 설비의 결선도

바) 각종 기기의 상세도

아. 소방

1) 공사 시방서 : 일반시방서, 특기시방서, 관급시방서

2) 공사비 내역서 : 내역서, 관급내역서, 수량산출서, 단가산출서, 일위대가표

3) 장비 일람표 : 주요장비의 사양을 표기

4) 설계도면

가) 소방 설비도 : 해당 소방관련 설비

나) 소화 설비 계통도

다) 소방 계통도

라) 소화 설비 평면도

마) 소방 평면도

5.5 예비인증 취득업무

가. 예비인증 종류

1) 건축물 에너지효율등급 인증

2) 제로에너지건축물(ZEB) 인증

3) 장애물 없는 생활환경(BF) 인증

나. 과업의 내용

1) 각 인증 자료 및 제출 서류의 준비

2) 각 인증심사를 위한 자체평가서 작성 및 신청

3) 각 인증의 신청 후 보완 등의 업무

4) 예비인증서 취득(모든 예비인증은 설계용역 완료전 취득해야함)

다. 최종성과품

1) 예비인증서 각 1부.

2) 각 예비인증별 자체평가서 및 근거자료 각 3부.

3) 최종점수집계표 각 3부.

4) CD-ROM 각 2부.

5) USB(모든 서류 포함) 각 1부.

Ⅵ. 납품도서 목록

6.1 기본(중간)설계 납품도서

구분	설계 도서명	규격	수량	단위	공 종								비 고
					건축	소방	토목	조경	기계	전기	통신	무대
1	기본설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	도 면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	내역서 (관급자재포함)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략공사비 (총괄포함)
4	조감도(초안)	협의	1	부
5	구조계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		(필요시)

주)  1. 발주기관과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

2. ○표는 공종에 해당됨을 의미한다.

3. 도면 중 상세도면 제출 대상

- 계단평면‧단면 상세도, 지상층 외벽 평‧입‧단면도, 지하층 부분단면 상세도 각층 창호 평입면상세도

4. 기본설계보고서에 포함사항(사전조사내용, 분야별 설계 설명서, 공사개요, 법규 검토서, 향후 실시설계 방향 등)

6.2 실시설계 납품도서

가. 종합보고서(A4) 5부

종합보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4규격의 책자로 양면 인쇄하고 무선무사철로 좌철한다.

나. 공정표

공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출한다.

다. 조감도(60㎝×90㎝, 표구 포함) - 조감도 크기는 향후 협의하여 결정

라. 기타 발주자가 요구하는 성과품

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종								비 고
					건축	소방	토목	조경	기계	전기	통신	무대
1	설계설명서	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종
2	도 면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이2부
3	계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
8	일위대가	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	표준시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	USB메모리		2	EA	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	CD 1개
13	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

[서식 1] 착수계

착  수  계

감독관 경유 :

1. 용  역  명 : 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일 (착수일로부터 ○○○일)

본 업체는 상기 용역에 대한 착수계를 제출합니다.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

동해시장 귀하

[서식 2] 서약서

서   약   서

당사는 동해시에서 시행하는 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립 설계용역에 참여함에 있어 다음의 내용을 준수하고 이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립 설계용역 과정에서 당사의 과오로 인해 공사비가 증가하지 않도록 성실히 노력하겠으며, 당사의 과오로 인해 10% 이상 공사비 증액이 발생할 경우 행정처분 등 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 용역 수행과정에서 당사가 계약 의무사항을 성실히 이행하지 아니하여 동해시로부터 행정처분을 받았을 경우 행정처분을 받은 날로부터 1년 동해시에서 시행하는 설계공모 참여에 제한을 받아도 일체 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025년    월    일

○ 대표업체                      업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

○ 공동응모업체(자)              업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

동해시장 귀하

[서식 3] 사용인감계

사  용  인  감  계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 강원도 동해시에서 시행하는「발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립」 설계용역에 대한 입찰·계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용 인감계를 제출합니다.

첨부  인감증명서 1부.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

동해시장 귀하

[서식 4] 책임기술자 선임계

책임기술자 선임계

1. 용  역  명  : 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일

- 아          래 -

가. 성             명 :

나. 주             소 :

다. 주 민 등 록 번 호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며, 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  1. 자격(면허)증 사본 1부.

2. 재직증명서 1부.

3. 경력증명서 1부.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

동해시장 귀하

[서식 5] 참여기술자 현황

참여기술자 현황

연 번	분 야	직 위	자격종목 및 등록번호	주민등록번호	성 명	비 고
1				예)881212-1******
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

동해시장 귀하

[서식 6] 분야별 책임기술자 선임계

분야별 책임기술자 선임계

1. 용  역  명  : 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일

- 아          래 -

가. 기   술    분   야 :

나. 성              명 :

다. 주              소 :

라. 주 민 등 록 번 호 :

마. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 ○○분야에 대한 책임기술자로 선임하여 제출합니다.

붙임  1. 자격(면허)증 사본 1부.

2. 재직증명서 1부.

3. 경력증명서 1부.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

동해시장 귀하

[서식 7] 공동수급표준협정서(분담이행방식)

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 : 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 : 동해시청

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 건축공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년   월   일

공동수급 대표자 :           (인)

공동수급 응모자 :           (인)

동해시장 귀하

[서식 8] 보안각서

보  안  각  서

1. 용  역  명  : 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

가. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

나. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을「용역계약일반조건」제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

다. 본인은 본 용역수행과 관련하여 취득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인해 발주청에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는「건축사법」제20조(업무상의 성실의무 등)에 의한 손해배상 책임을 지고 처벌되어도 일체 이의를 제기하지 않는다.

붙임  참여기술자 각서인 1부.

2025년   월   일

주민등록번호 :

기 술  분 야 :

대   표   자 :           (인)

동해시장 귀하

[붙임] 참여기술자 각서인

참여기술자 각서인

성 명	주민등록번호	주 소	날 인
	예)881212-1******

[서식 9] 하도급 승인요청서

하도급 승인요청서

1. 용  역  명 : 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일

- 아          래 -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 적산 등)

나. 하도급금액 :

다. 하 도 급 자

1) 주    소 :

2) 상    호 :

3) 대 표 자 :

4) 보유면허 :

상기인에게 본 설계용역의 ○○분야를 하도급 하고자,「지방자치단체용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건」제5조(하도급 승인)에 따라 승인요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 1부.

2. 하도급계약서 사본 1부.

3. 참여기술자 명단(기술자격증, 경력증명서 및 재직증명서 포함) 1부.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

동해시장 귀하

[서식 10] (기본, 실시) 설계 검사원

(기본, 실시) 설계 검사원

1. 용  역  명 : 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일

본 용역의 (기본, 실시) 설계 완료에 따라 검사원을 제출하오니

검사하여 주시기 바랍니다.

붙  임  납품설계도서 1식.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :           (인)

동해시장 귀하

[서식 11] 주간 공정보고

주간 공정보고

1. 용  역  명 : 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 :

다. 계약금액 :

3. 용역진행사항

구 분	전주 진행사항(20. . .)	금주 예정사항(20. . .)	진행률(%)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축(전시), 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

2025년   월   일

책임기술자 :           (인)

동해시장 귀하

[서식 12] 월간 공정보고

월간 공정보고

1. 용  역  명 : 발한지구 도시재생사업 기능통합형 거점시설(복합문화공간)건립

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 :

다. 계약금액 :

3. 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비 고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

2025년   월   일

책임기술자 :           (인)

동해시장 귀하