『발굴유물 역사문화공간 조성사업(목포 청해사)』

설계용역 과업지시서

2022. 10.

-  목  차  -

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업의 명칭

2. 과업의 목적

3. 과업의 개요

4. 과업의 범위

Ⅱ. 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

2. 업무보고 및 회의

3. 관급자재의 선정

4. 설계 자문

Ⅲ. 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

2. 설계 일반 지침

3. 설계진행 시 유의사항

4. 설계도서의 작성

Ⅳ. 설계도서 작성요령

1. 공통사항

2. 계획설계

3. 중간설계

4. 실시설계

Ⅴ. 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

2. 기본(중간)설계 납품도서

3. 실시설계 납품도서

- 부  록 -

【붙임 1】 보안각서

【붙임 2】 책임기술자 선임계

【붙임 3】 하도급승인 요청서

【붙임 4】 실시설계 검사원

【붙임 5】 주간업무보고

【붙임 6】 월간업무보고

【붙임 7】 설계안전보건대장

Ⅰ. 과업의 개요

1. 과업의 명칭

ㅇ 발굴유물 역사문화공간 조성사업(목포 청해사) 설계용역

2. 과업의 목적

ㅇ 지역 유휴시설을 활용해 비귀속된 발굴유물을 체계적으로 보관·관리하고, 지역사회 및 나아가 국민들에게 다양한 전시·체험 등의 콘텐츠를 제공하는 인프라 구축으로 가치를 확산하기 위한 시설을 조성하고자 함

3. 과업의 개요

가. 과업대상 : 목포 청해사

나. 과업위치 : 전라남도 목포시 용해동 277-3번지

다. 필지면적 / 과업면적 : 2793.00㎡ / 1,532.43㎡ (문화 및 집회시설)

구 분		세부시설	면 적(㎡)	비 고
목포 청해사	대지면적	건 물 영 역 (청해사)	850.99	-
		주차장영역	241.50
		조경영역	424.37
		기 타 영 역 (차량출입구, 하역공간 등)	1276.14
		소 계	2793.00	-
	금회사업 연면적	수장영역(수장고,보존처리실,하역실 등)	500.92	지상 1층 ∼ 2층
		전시·체험영역(교육실,전시체험실A)	176.03	지상 1층
		업무영역(사무실,회의실,유물정리실)	97.20	지상 2층
		공용공간(로비,복도,계단실 등)	758.28	전 층
		지하 1층(기계실,저수조 등)	121.81	연면적 제외
		소 계	1532.43	허용범위 ±5% 이내

※ 실의 면적 및 세부시설은 기능의 효율성에 따라 조정 가능, 필요시설 추가 및 제안 가능

라. 과업내용 : 유휴시설 내 발굴유물 수장시설과 문화시설

(교육실, 전시체험실 등 포함) 구축

마. 예정공사비 예산액 : 3,909,066,000원(부가가치세 포함) ※천단위이하 절사

1) 제시된 공사비는 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등에 대한 총공사비이며, 각종(전기/가스/수도/우·오수 등) 인입비 및 시설분담금, 제반업무 등을 모두 포함한다. (예정공사비는 변경될 수 있음)

2) 제시된 공사비는 리모델링, 천장보수(석면조사 · 해체), 구조보수보강 등에 필요한 전체 비용임.

바. 과업기간 : 착수일로부터 120일(공휴일 포함)

1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주

기관과 협의 후 요구사항에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 대행기관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 기술용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

나) 기술용역계약일반조건 제24조(불가항력)

다) 기술용역계약일반조건 제32조(용역의 일시정지)

라) 기술용역계약일반조건 제32조의2(계약상대자의 용역정지 등)

마) 기술수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

바) 수요기관의 사업비 조달계획에 따른 용역기간 조정 요청 시

4. 과업의 범위

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 관계기관과의 사전협의 및 각종    인․허가(건축협의, 실시계획 인가 등 포함)에 필요한 서류작성․제출, 연면적 증가시 면적 승인 및    시설비 증액 협의에 필요한 모든 업무를 포함한다. (철거도서 작성 및 수량산출 포함)

※ 설계용역 성과물은 제반 인․허가, 각종 심의, 인증을 득한 성과물이여야 한다.

나. 인허가 업무

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 수급인이 대행하여야 한다.

2) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련 법규 및     규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한     선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 본 과업의 교통영향평가․개선대책수립 등 각종 영향평가, 도시계획시설 결정 및    실시계획의 인가를 실시할 경우 수급인은 각종 용역업체와 협의하여 발주기관     업무에 적극 협조하여야 한다.

4) 수급인은 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성 및 제출, 인장 날인 등 해당 발주     기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

5) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인허가(협의사항)에 따른 서류보완이     필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

다. 현황측량 및 지반조사를 실시한다. (관련 비용은 용역비와 별도로 실비 정산)

※「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(판로지원법) 제 7조」에 의거하여 지반   조사 1천만원, 현황측량 3천만원 이상일 경우 분리발주 실시예정

라. 건축물 철거, 지반 및 지장물 조사에서 폐기물 발견 시 지정폐기물 조사 및 성분    검사 결과를 반영한다.

마. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는    일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 각종 위원회 자문·심의 및 합동토론회    결과, 조치해야 할 사항을 설계도서에 반영한다.

바. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의    협의 하에 수행한다.

사. 국토교통부 고시 제2021-1080호(2021. 9. 8. 제정)  ｢공공 건설공사의 공사기간 산정    기준｣에 따라 적정 공사기간을 산정하고 그 산출근거를 제출하여야 한다.

아. 제출된 설계도서 등에 대한 지적 소유권은 발주기관에 있다.

자. 패시브(PASSIVE)계획 등 건축물 에너지효율 제고방안 및 건출물의 범죄예방       (CPTED) 등 에너지 효율화 및 인증을 의무적으로 수반되어야 하는지 검토하고    설계도서에 반영한다.

※ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 제12조 및

「건축법 제53조의2(건축물의 범죄예방)」참조

Ⅱ. 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 착수서류 (3부 제본 제출)

1) 착수계

2) 책임기술자 선임계 【붙임 2】

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황

4) 과업수행계획서

5) 설계용역수행 조직표 (연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등

7) 설계용역 예정공정표

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 (분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 계획서(하도급 승인요청은 착수 후 30일이내 제출)

10) 인력, 장비투입 예정현황

11) 보안각서(【붙임 1】 및 보안계획서)

12) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

13) 위 모든 서류가 담긴 CD 및 USB

나. 계획설계도서

1) 기본설계 검사원 【붙임 4】

2) 기본설계 도서 (세부 제출도서는 Ⅴ.납품목록 참조)

3) 개략공사비 내역서

4) 현황측량 성과도

5) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

다. 중간설계도서

1) 중간설계 검사원 【붙임 4】

2) 중간설계 도서 (세부 제출도서는 Ⅴ.납품목록 참조)

3) 지질조사보고서

4) 공사시방서(초안)

5) 현장조사 결과보고서

6) 관련법률 검토서

7) 구조계산서 등 계산서, 물량산출서

8) 예산초과 시 예산절감방안 검토서

9) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

10) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 실시설계도서 납품(체크리스트 검토결과 반영)

1) 실시설계 검사원 【붙임 4】

2) 실시설계도서 일체 (세부 제출도서는 Ⅴ.납품목록 참조)

3) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

4) 종결보고서

5) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

6) 설계검사원

7) 인·허가 및 관계법규에 따른 각종 인증 취득 증빙서류 및 관련 설계도서 일체

8) 손해배상보험증권

9)「건설기술진흥법」및 같은 법 시행령 등에 의거, 실시하는 각종 설계 관련 검토사항에   대한 조치결과 일체

10) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

마. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제8조)

- 주간공정보고 【붙임 5】

- 월간공정보고 【붙임 6】

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

가. 업무보고

1) 주간업무보고 : 매주 목요일 기준 붙임 양식에 따라 감독관에게 전자우편으로 제출한다.

2) 월간업무보고 : 매월 말 기준 문서(공문)로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 따라 제출한다.

3) 수시보고 : 설계용역 진행 시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 감독관에게 제출하여야 하고 감리자가 있는 경우 감리자의 검토를 통하여 처리한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우

에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종 별 설계내용

에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의

로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 설계지침서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출

하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에

필요한 자료를 작성하고 회의에 참석하도록 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대

해 특별한 사유가 없는 한 이를 반영한다.

2) 착수회의는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최하고 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명한다.

3) 계획/중간/실시설계 발표회 : 수급인은 계획/중간/실시설계 발표 자료를 작성하여 최소한 발표회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 발표회를 발주기관이 지정하는 장소에서 개최하여 관련 내용을 협의한다.

4) 수시회의 : 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 발표 시 협의를 위해 실시하며, 책임기술자는 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

5) 기타회의 : 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인

향상을 위한 자문회의 등 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 수급인은 발주

기관의 요청에 의한 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다. 또한

필요에 따라 회의 진행에 관한 세부사항은 발주자가 별도 통보할 수 있다.

3. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제83조

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제11조

나. 수급인은 상기 운영기준에 의거 해당되는 자재 리스트 및 관급자재 검토서를 해당 시기에 작성, 제출한다.

다. 수급인은 관급자재 선정심의에 필요한 자료작성 시 감독관과 긴밀히 협조하여 관급자재 선정 심의 운영에 적극 협조하여야 한다.

4. 설계자문

가. 수급인은 설계공모 심사위원, 자문위원, 발주자 등의 지적사항을 설계에 반영하여야 한다.

나. 수급인은 심사위원 등의 지적사항을 설계단계별(계획, 중간, 실시설계)로 반영, 계획서를 작성하여 용역착수 시 보고한다.

다. 수급인은 단계별 도서납품 시 지적사항 조치보고서를 첨부한다.

Ⅲ. 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업은 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술 진흥법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 해당 지자체의 조례, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방시설공사업법, 환경영향평가법, 도시교통정비 촉진법 등 당해 사업 관련된 법령과 각종 고시, 지침 등에 위배되지 않아야 한다.

나. 본 과업은 제 24조(설계도서 작성기준)는 건설공사의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)에 의거 작성한다.

다. 수급인은 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

라. 설계의 책임 및 손해배상책임

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 (계약예규) 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호 간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령【건축사법 제11조(자격의 취소 등), 제20조 업무상의 성실 의무 등】에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 수급인은 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

2. 설계 일반 지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서로 구분하여 제출한다.

나. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

다. 수급인은 공사 중 설계도서와 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서, 검토서 제출, 현장 회의) 하여야한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약 이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법 시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자가 건축사와 협력하여 해당 건축설비를 설계하여야 한다.

바. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안정성과 조형미를 살리면서 국가 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변 경관 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 대지현황 및 주변 인접지 현장조사 및 지반조사, 측량, 우수량, 지하수위 등을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

3) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

4) 해당 허가권자와 사전협의를 통하여 관계법 등에 따른 불필요한 변경이 생기지 않도록 한다.

5) 관련기관 심의 시 문제가 없도록 사전 검토를 철저히 하고, 심의일정에 의한 일정에 차질이 없도록 한다.

6) 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

7) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

사. 수요를 감안한 설계

1) 이용자의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계여야 한다.

2) 성장과 변화를 고려한 합리적인 평면·입면과 조화되는 조경 등 종합적으로 고려된 설계로 조형성과 독창성을 갖춘 쾌적한 환경을 조성하여야 한다.

3) 전기 및 정보통신분야 (LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용하여야 하며, 전화 및 LAN 구축은 발주기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

4) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계한다.

아. 환경친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지 이용을 극대화하고 쾌적한 환경을 조성한다.

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 오․우수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계한다.

3) 대지주변이나 건축물 내 진동원(振動源), 소음원(騷音源)이 있는 경우, 대책을 수립하여 설계한다.

4) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 설계한다. ※ 소음·진동 관리 관련법에 맞게 설계

자. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

차. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 내진설계 및 구조확인에 대한 검토를 적용한 안전한 구조설계를 계획한다.

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계를 계획한다.

3) 지반조사 결과에 따라 합리적인 기초구조 계획이 이루어진 설계를 실시한다.

4) 기존 옹벽시설과 조경시설을 존치하되 전체 미관 및 안전을 고려하여 설계에 반영한다.

카. 주요자재 사용계획

1) 관급자재 심의 전 철저한 검토(예산 및 기능) 후 심의회 개최 결과에 따라 관급자재를 적용한다.

2) 주요자재(외부마감 등)는 비교검토서 및 견본을 준비하여 협의 후 결정하여야 한다.

ex) 외장재 비교검토서, 창호개폐방법 비교검토서, 천장마감시스템 검토서, 방수공법 검토서 등

3) 국내 자재중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

4) 조달청 우수제품 및 신기술제품 우선적으로 검토하여 적용한다.

3. 설계진행 시 유의사항

가. 수급인은 현황측량을 실시하여 측량성과도를 기준으로 설계를 진행하며, 대지경계측량의 경우 필요시 한국국토정보공사에 측량을 의뢰(경계복원측량)하여 성과도를 제출한다. (발주기관 부담, 용역비에서 제외)

나. 지반조사 시 사전에 지반조사 시기 및 위치를 포함한 지반조사 계획서를 제출하여 승인 후 시행한다(지질조사 후 결과보고서 제출/발주기관 부담)

다. 설계 완료 후 착공 시 시공사가 시행한 지반조사 및 구조안전진단에 의거 기초구조 및 가설공법에 대한 설계변경 사항이 발생할 경우 수급인은 이에 대하여 검토하여야 하며, 감독기관(감리자 포함)이 설계변경의 타당성을 인정한 경우 변경사항에 대한 재설계 및 제반사항을 이행하여야 한다.

라. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하 매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영한다.

ex) 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물 등

마. 사업 대상 부지가 연약지반 또는 암반일 경우 관련 조사 및 보고서를 반영하여 설계한다.

바. 수급인은 대지경계 부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 하고, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 검토 후 설계에 반영한다.

사. T.B.M(가 수준점)은 부지 내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

아. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 대기환경보전법에 의거하여 비산먼지 방지대책을 설계에 반영하여야 한다

자. 수급인은 건설현장 축중기 설치지침 【국토교통부훈령 제1058호】에 따라 필요시 축중기를 설계에 반영한다.

차. 수급인은 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지반조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계한다.

파. 수급인은 인테리어 설계가 필요한 부분에 대해서는 발주기관과 사전협의 후 예산 등을 고려하여 설계한다.

카. 수급인은 상수도의 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계한다.

타. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준으로 설계에 반영한다.

하. 정밀안전진단 결과를 참고하여 구조보강 설계가 될 수 있도록 반영한다

4. 설계도서의 작성

가. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등 도면은 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 검토가 가능하도록 하며, 리모델링 변경 전·후 도면을 명확하게 작성하여야 한다

나. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다. (착수계와 비교 확인, 경력증명서 신청 시 확인)

다. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 건축, 기계, 전기, 통신, 소방 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

3) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등)를 작성하고 견적(부가세 및 제경비 포함여부 확인)일 경우 2개 이상 조사한다.

라. 건축물 폐기물처리 및 석면해체(석면조사 포함)에 대한 설계도서는 관계법에 의거 분리발주가 가능하도록 작성하여야 한다.

마. 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 공종 별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. 단, 발주단위에 대해서는 필요시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

Ⅳ. 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. 설계도서 작성은 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2016-1025호)을 준수하고 동 기준의 별표 「설계도서 작성방법」에 따라 작성한다.

나. 시방서는 조달청에서 ‘시방서 작성 간소화 및 내실화’ 목적으로 마련하여 제공하는 『설계자가 작성하는 공사시방서 양식』(조달청 홈페이지→조달업무→업무별 자료→시설공사 게시판)에 따라 작성한다.

※ 특기시방서는 임의 양식으로 작성 가능함

2. 계획설계

가. 일반사항

1)	수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 발주자의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 설계공모 제안서의 개념에 의거하여 2개 이상의 계획설계안(대안)을 작성하고 자문위원회(가칭)의 평가를 거쳐 계획설계안을 확정한다.

3) 수급인은 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획설계를 진행하되 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

4)	자문위원회(가칭)의 평가 결과 및 보완사항을 반영한 설계안을 제출하여 발주기관의 승인을 득하여 계획설계안을 확정한다.

나. 계획설계(안) 작성시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 오․우수계획〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획 (전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리 및 조경계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화(대안 제시)

6) 개략공사비 산정내역

7) 측량성과도

8) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

다. 현장조사

1) 관련문헌 및 서류조사와 현장조사 병행

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 차량소음, 진동 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사한다.

- 해당 관계기관 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부한다.

3. 중간설계

가. 일반사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다. 안에 따른 연관분야의 시스템 검토(검토서 작성) 후 협의, 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량 등이 구체화된 설계도를 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지반(지질)조사계획서에 근거한 지반(지질)조사를 실시한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

4) 연관분야의 시스템 검토(검토서 작성) 후 협의, 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량 등이 구체화된 설계도를 작성하고 개략공사비를 산출한다.

- 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

- Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

5) 2단계 체크리스트(중간설계)를 각 공종 감독관과 협의 및 확인 후 작성한다.

나. 중간설계서 구성

1) 설계보고서〔공종별 공사개요, 개략공사내역서, 사전조사자료 등)

2) 공종별 설계도서(시방서, 각종 계산서 포함)

3) 지반조사 보고서

4) 구조안전진단 보고서(수행할 시)

5) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(체크리스트, 자문회의 자료 등)

4. 실시설계

가. 일반사항

1) 중간설계를 기초로, 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별, 발주단위별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

3) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

4) 시설공사 계약요청 자료로 공사개요서(장기계속공사일 경우 금차분의 예산에 맞게 시설비 예산을 분리하여 작성) 및 관급자재 목록(운반거리, 조건, 금액, 구분표기), 공사원가계산서를 작성하여 제출한다. 최종 설계금액이 시설비 예산을 초과할 경우 설계용역 미완으로 간주한다.

5) 건설폐기물처리용역 관련 도서(건설폐기물, 폐아스콘, 지정폐기물 각각)는 수량을 검토한 후 관계법령에 맞게 분리발주가 가능하도록 작성한다.

※ 폐기물 수량산출서는 별도로 작성하여 제출

6) 최종 CD 및 USB 제작 : 계획/중간/실시설계도서 및 검토/발표 자료와 각종 서류, 인증/심의/허가 등 모든 자료를 포함하여 1장으로 제작하고, 분야별 참여기술자(책임기술자/담당자) 연락처를 포함한다.

나. 실시설계도서의 구성

1) 시설공사 실시설계도서(가설계획도, 색채 계획도, 자재견본 등 포함)

2) 각종 계산서 및 검토서, 인증·심의·건축허가(실시계획인가) 관련도서를 포함한다.

3) 가설계획도, 기초 구조도, 토목 흙막이도면을 overlap(도면제출)하여 검토 확인한다.

4) 최종 납품 전 검토용 도서를 제출하여 발주기관의 승인 후 납품한다.

Ⅴ. 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구 분	설 계 도 서 명	규 격	수 량	단 위	비 고
1	결과보고서 및 요약본	A4	5	부
2	기본 설계도서	A3(반접)	5	부	추정공사비 내역서 포함
3	현황측량성과도		5	부
4	관련법규 검토서	A4	5	부

※ 위 제출목록 전부를 CD 및 USB로 제작하여 제출(요청 시)

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규 격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면(반접)	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리, 조감도 1컷
3	내역서(관급내역서)	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
4	계 산 서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전문시방
6	지반조사보고서	A4	5	부		◯

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	결과보고서 및 요약본	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	각 7부
2	설계설명서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
4	계산서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서(도급/관급)	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	관급내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	일위대가/단가산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일반/전문/관급시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	공정표	A3	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
11	CD 및 USB	-	5	식	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합 (USB는 3식)
12	기타											발주기관 요구
13	장애물 없는 생활환경예비인증,비산먼지 발생사업 등 사업관련 인증서(증명서) 및 신고서											해당 시

나. 결과보고서 : 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치 결과, 건축물유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 제출

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출한다.

라. 참여기술자 현황 (공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

마. 기타 발주기관이 요구하는 성과품

- 부  록 -

【붙임 1】 보안각서

【붙임 2】 책임기술자 선임계

【붙임 3】 하도급승인 요청서

【붙임 4】 실시설계 검사원

【붙임 5】 주간업무보고

【붙임 6】 월간업무보고

【붙임 7】 설계안전보건대장

【붙임 1】 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 발굴유물 역사문화공간 조성사업(목포 청해사) 설계용역

2. 계약  일자 : 202 .   .   .

3. 착수  일자 : 202 .   .   .

4. 완수예정일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

가. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

나. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제36조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

다. 본인은 본 용역수행과 관련된 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

라. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

마. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 발주기관에 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202 년    월     일

주        소 :

생 년  월 일 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

(사)한국문화유산협회장 귀하

【붙임 2】 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 발굴유물 역사문화공간 조성사업(목포 청해사) 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 성       명 :

나. 주       소 :

다. 생 년 월 일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

(사)한국문화유산협회장 귀하

【붙임 3】 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 : 발굴유물 역사문화공간 조성사업(목포 청해사) 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 건설기술용역계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

(사)한국문화유산협회장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인		연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용		검토결과		비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업 기본법 시행규칙 제27조의 2
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약특수조건 제6조

【붙임 4】 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 : 발굴유물 역사문화공간 조성사업(목포 청해사) 설계용역

2. 계약금액 :      원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

(사)한국문화유산협회장 귀하

【붙임 5】 주간공정보고

주간공정보고

1. 용 역 명 : 발굴유물 역사문화공간 조성사업(목포 청해사) 설계용역

2. 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

3. 용역진행사항

구 분	전주진행사항(202 . . .)	금주예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

(사)한국문화유산협회장 귀하

【붙임 6】 월간공정보고

월간공정보고

1. 용 역 명 : 발굴유물 역사문화공간 조성사업(목포 청해사) 설계용역

2. 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

3. 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

(사)한국문화유산협회장 귀하

【붙임 7】 설계안전보건대장

설계안전보건대장

1. 사업개요

공 사 명
현장 주소
공사기간
공사금액
발주자	회사명				전화번호
	대표자				지정된 담당자
	주소
설계자	회사명				전화번호
	대표자				대장 작성자
	주소
공사개요		주요 구조물	구조	개소		최대 굴착 깊이(m)	최고높이 (m)		연면적 /길이
특수 구조물 개요

2. 공사금액 및 공사기간 산출서

1) 공사금액 산출서

2) 공사기간 산출서

3. 주요 유해·위험요인 및 감소대책에 대한 위험성평가 내용

1) 위험성 평가 기준(발생 가능성(빈도), 중대성(강도), 허용 위험성 기준)

(1) 발생 가능성과 중대성 기준

(2) 허용 위험성 기준

2) 유해·위험요인별 감소대책

No	공종명	유해·위험요인	위험성 감소대책

4. 유해·위험방지계획서 작성 계획

작성 대상 여부	근 거	작성계획

5. 안전보건조정자 배치계획

배치 대상 여부	배치 계획

6. 건설공사의 산업재해예방지도 실시 대상 확인 및 실시계획

대상 여부	근거	실시계획

7. 산업안전보건관리비 산출계획

계상금액	계상 근거

8. 작성(변경) 일자 : 00년 00월 00일

9. 작성 및 확인자

1) 작성자

소속	직위	자격	성명	서명

2) 확인자

소속	직위	자격	성명	서명

(사)한국문화유산협회장 귀하