- 고창군 제2청사(의회청사) 건립사업

기본 및 실시설계용역 -

과 업 지 시 서

2022. 12.

고 창 군

-  목          차  -

제1장 총 칙

1. 명칭	1

2. 목적	1

3. 개요	1

4. 과업의 범위	2

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	5

2. 업무보고 및 회의	6

3. 보안성 검토	8

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	9

2. 설계 일반지침	10

3. 설계진행 과정의 유의사항	15

4. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인	17

5. 설계도서의 분리작성	18

6. 설계도서 표기	18

7. 도면작성	18

8. 기타사항	19

제4장 작성요령

1. 공통사항	21

2. 계획설계	21

3. 중간설계	24

4. 실시설계	36

제5장 납품 도서 목록

1. 계획설계 납품도서	44

2. 중간설계 납품도서	44

3. 실시설계 납품도서	45

【부록】

<서식 1> 보안각서	47

<서식 2> 책임기술자 선임계	48

<서식 3> 하도급 승인요청서	49

<서식 4> (계획, 중간, 실시)설계 검사원	51

<서식 5> 주간 공정보고	52

<서식 6> 월간 공정보고	53

제1장  총칙

1. 용역명 : 고창군 제2청사(의회청사) 건립사업 기본 및 실시설계용역

2. 목적

- 본 과업은 현 군청사와 의회청사를 분리하여 현 군청사의 부족한 업무공간을 확보함과 동시에 원활한 행정업무와 의정활동 증진을 도모하고자 함

3. 개요

가. 대지위치 : 전라북도 고창군 고창읍 읍내리 198-4번지 일원

나. 대지면적 : 5,031㎡

다. 연 면 적 : 1,852㎡

라. 층     수 : 지하1층 / 지상5층 (층수 변경 가능)

마. 주 용 도 : 업무시설[공공업무시설]

바. 공사예산 : 금6,700백만원(부가세 포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비(BEMS포함), 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리비, CI 등에 대한 총 공사비이며, 또한 각종(전기, 가스, 수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함함

사. 과업기간 : 계약일로부터 180일(국·공휴일 포함)

1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우에 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

2) 사후설계관리

- 공사 준공 완료시까지 발주·시공·준공단계 설계지원 및 설계의도가 구현될 수 있도록 지도하며, 건축법 등 기타 관련 법령에 따라 업무를 수행한다.

3) 용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련자료 제출과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 수행하여야 한다.

4) 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제19조(계약기간의 연장), 제24조(불가항력), 제32조(용역의 일시정지), 제32조의2(계약상대자의 용역 정지 등)에 해당하는 경우

나) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

다) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능한 경우

라) 기타 발주청의 필요에 의한 경우

4. 과업의 범위

가. 공사 시 필요한 일체의 설계도서 작성 등 그 범위(건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 조경, 신재생에너지 등)의 상호관계를 조율 및 검토하여 최적의 설계안을 도출하여 이에 수반되는 관련 조사, 공용건축물 협의, 기타 인·허가에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 과업에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등 발주기관이 업무와 관련되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

나. 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 설계 결과물은 제반 인허가(작성, 제출 포함)를 포함해야 한다.

다. 과업의 범위는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 기타 부대시설 등 전 분야 일체로 하고 해당 분야와 관련된 법령 및 규정, 지침 등을 따라야 한다.

라. 수급인은 정부 및 관련기관 위원회의 자문, 심의 및 영향평가 등에 협조해야 한다.

마. 수급인은 발주기관이 지시하는 사항을 이행하고, 그 결과보고서를 제출해야 한다.

바. 수급인은 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명시되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 수행해야 한다.

사. 인허가 업무

1) 과업수행에 필요한 일체의 인허가 및 평가는 수급인이 대행해야 한다.

2) 수급인은 과업착수 후에 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문하여 협의하고 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 포함한 추진계획서를 작성하여 발주기관에 제출해야 한다.

3) 해당부지 등에 대한 각종 행위허가 및 관련 인허가가 필요한 경우에는 수급인의 책임하에 시행한 후, 발주기관과 건축협의를 진행해야 한다.

- 자문 및 인·허가 행정절차 도서작성

- 건축허가(변경포함), 준공시 세움터 신청 및 협의·절차진행에 따른 인증

- 경관 및 공공디자인심의 등 각종 심의 및 인증에 필요한 관련기관 협의·신청·관련자료 작성 및 업무대행 등 발주청이 업무와 관련되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함

4) 각종 인증관련(건축물에너지효율등급, 제로에너지건축물, 장애물없는생활환경, 에너지절약계획서, 신재생에너지 설치 의무계획서 등) 설계도서 작성 및 인증업무를 수행한다.

5) 도시관리계획 변경인가, 교통영향평가(변경신고, 변경심의), 환경영향평가(환경보전방안 포함) 등 각종 영향평가를 실시할 경우에 수급인이 대행해야 하며, 발생되는 비용은 수급인이 부담한다.

6) 수급인은 향후 시공업체가 사용승인을 신청 할 때에 준공도서 작성, 인장날인, 준공도서의 세움터 등록 등에 적극 협조해야 한다.

7) 수급인은 과업이 완료된 후에라도 인허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관이 요청 할 경우에는 적극 협조해야 한다.

8) 수급인은 「녹색건축물 조성 지원법」 및 「녹색건축인증에 관한 규칙」에 따른 에너지효율 1++등급 및 녹색건축 우수등급 이상을 획득해야 한다. (필요시. 단, 목표 등급은 발주기관과 협의하여 조정 가능)

9) 수급인은 발주기관의 요청이 있을 경우, 지급자재 리스트 및 검토서 작성에 협조해야 한다.

10) 필요시 수급인은 ‘설계의 안전성 검토, 설계안전보건대장, 설계의 경제성등 검토’를 수급인의 부담으로 실시해야 하고 그 결과를 설계에 반영해야 한다.

아. 사후설계관리업무

1) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방관련 설계지원 및 설계의도가 구현될 수 있도록 지도하며, 건축법 등 기타 관련 법령에 따라 업무를 수행한다.

2) 기타 지침에서 정하지 않은 사항은 「건축서비스산업 진흥법」 제22조에 따른다.

자. 본 과업을 용역을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 수행하여야 한다.

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 과업 착수 시에 다음의 서류를 2부 제출해야 한다. (계약체결 후 7일 이내)

1) 착수계 1부.

2) 책임기술자 선임계 1부.

3) 설계과업 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부.

4) 과업수행계획서 1부.

5) 설계과업수행 조직도(연락처 기재) 1부.

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서, 재직증명서 각 1부.

7) 설계과업 예정공정표 1부.

8) 계약금액에 대한 산출내역서 1부. (분담이행자 과업수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부.

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부.

11) 청렴이행각서 및 보안각서 1부. (보안계획서 작성 포함)

12) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항.

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수보고회를 개최해야 하며, 위 ‘가’에서 언급한 서류를 중심으로 발주기관이 지정하는 장소에서 책임기술자가 설명해야 한다.

다. 수급인은 설계 납품 7일 전까지 다음의 체크리스트를 발주기관과 협의한 후에 제5장의 설계 납품도서를 제출해야 한다.

구분	계획설계	중간설계	실시설계
체크리스트	① 관련 법규 ② 배치, 평면 및 입면안 ③ 구조공법 ④ 설비공법 ⑤ 현장조사의 적정성 ⑥ 발주기관 요구사항의 반영여부	① 공사비(총괄, 분야별) ② 설계도면(분야별) ③ 공사시방서 ④ 구조계산서 ⑤ 예산초과 시 절감 방안 ⑥ 부하계산서 ⑦ 발주기관이 선정한 지급자재의 반영 여부	① 설계설명서(분야별) ② 실시설계 도면 ③ 발주용 내역서 ④ 공사시방서 ⑤ 구조계산서 ⑥ 물량산출서 ⑦ 단가산출, 견적서 ⑧ 공종별 교차 체크 ⑨ 각종 인증관련 도서 ⑩ 설계용역 손해배상보증서

2. 업무보고 및 회의

≪수급인은 설계 진행과정에서 발주기관에 정기적으로 보고해야 한다.≫

가. 업무보고

1) 주간 공정보고

- 매주 월요일 등 날짜를 정하여 <서식 5>의 양식에 따라 작성하여 보고해야 한다.

2) 월간 공정보고

- 매월 말 일자를 기준으로 업무수행실적 및 계획서를 <서식 6>의 양식에 따라 작성하여 보고해야 한다.

3) 수시보고

- 설계 진행과정에서 문제점이 발생할 경우에는 그때마다 문제점을 분석하여 그 결과를 보고해야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인은 설계 진행과 관련된 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 해야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 과업지시서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정해야 한다.

다) 과업지시서에 대하여 부분적인 대안이 제시될 수 있으며, 이 경우에는 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

라) 각종 회의 시 수급인은 회의 장소와 참석 범위 등을 발주기관과 협의하고 회의에 필요한 자료를 작성해야 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행한 후에 발주기관의 지적·보완·수정·요구 사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이를 반영해야 한다.

바) 발주기관은 수급인에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출·요구하여 수정·보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

2) 착수보고회

가) 착수보고회는 계약일로부터 14일 이내에 발주기관과 장소와 일자를 협의하여 개최해야 한다.

나) 착수보고회 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명해야 한다.

3) 계획·중간·실시설계 보고회

가) 수급인은 각 단계별 설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 발주기관과 사전협의를 거친 후에 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의해야 한다.

4) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 따라 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해관계자 회의, 디자인 향상을 위한 회의, 설계 적정성 검토 합동토론회를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 수급인은 발주기관의 요청에 따라 해당 검토서 등 관련 자료를 작성하여 제출해야 한다.

나) 발주기관은 필요에 따라 회의 진행에 관한 세부사항을 별도로 통지할 수 있다.

3. 보안성 검토

가. 수급인은 과업지시서에 따라 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안 대책을 수립해야 한다. (착수계 제출 시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 결과물은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출 시켜서는 안된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고 소각대장을 제출해야 한다.

4) 보안상 결함으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

제3장  과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 과업은 「건축법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 고창군 해당 조례, 「정보통신공사업법」, 「전기공사업법」, 「전력기술관리법」, 「소방시설공사업법」, 「공간정보관리법」, 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」, 「환경영향평가법」, 「도시교통정비 촉진법」 「기계설비법」 등 관련 법령과 각종 고시, 지침 등을 위배해서는 안 된다.

나. 과업은 “설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부고시 제2021-981호(2021.7.23.))”에 따라 수행해야 한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 결과물을 납품 완료해야 하며, 이를 위반 시 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제18조(지체상금)에 따르는 사후 조치에 이의를 제기할 수 없다.

2) 수급인은 설계 완료 후라도 설계과업과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량 누락, 보완설계, 협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 이에 대한 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 무상으로 추가과업을 수행해야 한다. 이에 대한 비협조로 사업추진에 문제가 발생하거나, 중대한 설계 과오로 판단될 경우에는「건축사법」 제11조(자격의 취소 등) 및 제20조(업무상의 성실의무 등)에 따르는 조치에 이의를 제기할 수 없다.

3) 책임 및 손해에 대하여는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제197호), 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시 제2019-997호), 건축사법, 용역계약일반조건에 따르며, 보험증서 또는 공제증서를 용역 준공 시 제출하여야 한다.

4) 수급인은 설계용역 준공 후 공사 중 설계도서의 해석이 다를 경우 등 설계도서와 관련된 문의 및 질의사항에 적극적인 협조(답변서 제출 등)와 설계자의 자문이 필요할 경우 설계의도 등에 대하여 설명하여야 한다.

2. 설계 일반지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계 도서로 구분한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)해야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우에 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 수급인은 「건축법」 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용해야 한다.

마. 수급인은 「건축법시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법령에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 하며, 관련부서와 협의 후 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

바. 부지의 입지 조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안정성과 조형미를 살리면서 주변 건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계해야 한다.

2) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계해야 한다.

3) 사업부지 주변 현황을 고려하여 안정성 있고 기존 건물과 조화를 이루도록 설계해야 한다.

4) 현 공영주차타워와의 관계, 향후 군청사와의 연계를 고려하여 효율적인 동선을 확보하여야 한다.

5) 구내도로, 공동구, 피트 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계해야 한다.

6) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

7) 부지의 토지 이용률 및 건물 밀도를 감안하여 계획해야 한다.

8) 사업부지 주변 도로는 공사 준공 전 재포장하여 주변 환경을 저해하지 않도록 하고, 도로 주변 배수계획을 면밀히 검토하여 집중 호우에 지장이 없도록 해야 한다.

9) 사업부지 주변 도로 경사(기울기)가 심하여 동절기 통행시 안전사고 발생 우려가 있는 경우 도로 열선 시공 등의 보완책을 면밀히 수립, 검토하여 반영해야 한다.

사. 수요를 감안한 미래지향적 첨단시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지를 반영해야 한다.

2) 전화 및 LAN 구축은 발주기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의한 후에 적합한 통신회선을 확보해야 한다.

3) 공동구, 피트 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계해야 한다.

4) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용해야 한다.

5) 전력공급의 신뢰성, 안정성, 확장성, 유연성 등이 있어야 하고 위험성이 적어야 하며, 전력설비 운영에 편리성을 고려한 시스템 구성으로 계획해야 한다.

아. 수급인은 부지 주변이나 건축물 내 소음원이 있는 경우에는 소음에 대한 대책을 마련하여 설계해야 한다.

자. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) 창호, 내․외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계해야 하고 에너지 관련 예비 인증 및 본 인증의 획득에 협조해야 한다.

2) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계해야 한다.

3) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정한 환기로 최적화된 환경을 조성해야하며 건물의 용도와 실에 따라 적정 조도를 반영하여 설계해야 한다.

4) 평면 및 입면 설계 시 에너지 절약형으로 설계해야 한다.

5) 『신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법』『공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정』등 관련 법령을 준수하여 설계에 반영해야 한다.

6) 전기설비에서 동일 부하별로 뱅크를 구성하여 간선의 길이가 최소화 되도록 계획해야 한다.

차. 환경 친화적 부지환경 조성 및 설계

1) 합리적인 토지이용계획으로 부지 이용을 극대화하고 쾌적한 환경을 조성해야 한다.

2) 조경포장 및 시설물, 외부 구조물 및 옹벽, 우․오수계획 및 기타 시설은 환경 친화적으로 설계해야 한다.

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소화 되도록 설계해야 한다.

※「소음․진동관리법」 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

4) 녹색건축물 인증제도에 의한 녹색건축물 예비 인증 및 본 인증 우수등급 이상을 취득해야 한다.(해당시)

5) 고창군 환경영향평가 등 인허가 관련 의견을 반영하여야 하며, 의견 미반영 및 누락 등으로 인한 문제가 발생하지 않도록 설계해야 한다.

카. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화될 수 있도록 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난이 용이하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계해야 한다.

3) 변전실 위치는 아래의 사항을 고려하여 선정해야 한다.

가) 부하의 중심에 가깝고 배전에 용이한 장소

나) 장래 증설에 대비한 기기의 호환성 검토 및 여유공간 확보

다) 완전한 침수방지 조치 설계

타. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조로 설계해야 한다.

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조 안정성이 확보되도록 설계해야 한다.

3) 지질조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조로 설계해야 한다.

파. 향후 증축대비 설계(발주기관과 사전 협의 필요)

1) 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립하고 이를 반영해야 한다.

2) 추후 증축에 대한 고려를 하여 대안을 제시한다.

하. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경 친화적이고, 경제적인 자재를 사용해야 한다.

2) 국내 자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우에는 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정해야 한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재를 사용해야 한다.

4) 지급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후에 설계하고 내역에 반영해야 한다.

거. 하도급의 범위

1) 수급인은 설계과업을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지질조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 전기․정보통신, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 기계설비의 착공 전 확인 업무

바) 건설공사의 수량 및 견적업무

사) 도시관리계획 변경인가, 교통영향평가(변경신고, 변경심의), 환경영향평가(환경보전방안 포함) 등 관련업무

아) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급 업무에 대해서 책임을 진다.

너. 기계설비의 착공 전 확인

1) 수급인은 「기계설비법」제14조(기계설비 기술기준)에 적합하게 설계 해야 한다.

2) 수급인은 설계완료 전까지「기계설비법」제15조(기계설비의 착공 전 확인과 사용 전 검사) 및 「기계설비법시행령」제12조(기계설비의 착공 전확인)에 의거 관할 부서에 “착공 전 확인” 신청을 하여 승인받아야 한다.

3. 설계진행 과정의 유의사항

가. 수급인은 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의 및 승인을 얻어야 하며, 사전협의 결과서를 제출해야 한다.

나. 수급인은 「신․재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정」(산업통산자원부 고시 제2022-175호, 2022.10.21.)에 따라 신․재생에너지를 지열로 설계 시 시험천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열 이용 검토서를 작성하여 제출해야 하며, 이와 관련된 비용은 수급인이 부담해야 한다.

다. 지질조사 시 사전에 위치 선정 등 지질조사 계획서를 발주기관에 제출하여 승인을 얻은 후에 지질조사를 시행해야 한다. (지질조사 후 결과보고서 제출)

라. 수급인은 가설계획도(복공계획, 양중장비계획, 공사 시 하중에 대한 구조보강 계획 등)를 작성하고 내역에 반영해야 하며, 현장여건 상 가설사무실 설치가 불가할 경우에는 임대비용을 조사하고 내역에 반영해야 한다.

마. 발주기관의 감독관실에 비치되는 집기류 등 임대비용은 공사규모, 기간별로 적정금액을 내역서에 별도로 반영해야 한다.

바. 수급인은 인테리어 설계가 필요한 실에서는 인테리어 설계에 대한 계획, 중간, 실시설계 단계별로 발주기관에서 보고회를 개최하고 승인을 얻어야 한다.

※ 인테리어 설계가 필요한 실은 추후에 발주기관과 협의하여 시행

사. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사해야 하고, 지하매설물이 있을 경우에는 이설 방안을 조사하여 설계에 반영해야 하며 조사항목은 다음과 같다.

- 공공시설물, 전기, 통신, 상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

아. 수급인은 상수도의 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영해야 한다.

자. 수급인은 사업 대상부지가 연약지반일 경우에는 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계해야 한다.

차. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접부지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계해야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 관할청 등과 사전 협의한 후에 설계에 반영해야 한다.

카. 임시 수준점(T.B.M)은 부지 내 2점 이상 설정하여 도면에 표기해야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시하고 보호조치를 취한 후에 공사 업체에게 인도해야 한다.

타. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하고, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토한 후에 반영해야 한다.

파. 수급인은「건설현장 축중기 설치지침」 (국토해양부 훈령 제1058호, 제정 2018.08.01.)에 따라 축중기를 설치해야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영해야 한다.

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

- 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 이를 설치할 수 있다.

하. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계해야 한다.

- 공사를 착공한 후에 지질조사보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래하는 경우에는 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중 등을 검토한 후, 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 따라 조치됨을 숙지해야 한다.

거. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영해야 한다.

너. 발주기관의 요구사항은 적법성을 검토하여 설계에 반영해야 한다.

4. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인

가. 수급인은 사업특성에 맞게 예정공정표를 작성하여 승인을 얻어야 하며, 예정공정표에는 단계별 심사 일을 지정하고 각 단계별 제출도서를 제출한 후에 승인을 얻어야 한다.

나. 체크리스트의 서류작성 프로그램은 엑셀로 작성해야 한다.

다. 엑셀로 작성된 USB 1개 및 A4 좌철제본 책자 3부를 제출해야 한다.

5. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경 포함), 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성해야 한다. (도면, 내역서, 일위 대가표, 수량  산출기초 등) 단, 발주 단위에 대하여는 작성 전에 발주기관과 협의해야 한다.

나. 건축 폐기물처리도서는 분리발주가 가능하도록 작성해야 한다.

6. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제5조(사용언어)에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수해야 한다.

공 종	건축	구조	인테 리어	토목	조경	기계	전기	통신	소방 기계	소방 전기
기 호	A	S	EX	C	L	M	E	T	MF	EF

7. 도면작성

가. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기해야 한다.

다. 토목, 조경, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주기관의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 대조가 가능하도록 해야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시해야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 해야 한다.

1) 각부 치수 및 사용 자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 관련공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우에는 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

8. 기타사항

가. 건축설계가 완료된 후 공사시공 과정에서 건축사의 설계의도가 구현될 수 있도록 건축주, 시공자, 감리자 등에게 설계의 취지 및 건축물의 유지, 관리에 필요한 사항을 제시하여야 한다.

나. 건축물의 사용승인 시, 공사감리자의 감리완료보고서 또는 공사 완료도서에 참여설계자의 확인서를 제출하여야 한다(건축서비스산업 진흥법 제22조)

라. 설계의 경제성 등 검토(이하 ‘VE’라 한다)를 수행해야 한다.

1) VE 제안보고서 작성을 지원해야 한다.

2) VE 채택결과에 따른 결과물을 제출해야 한다.

가) VE가 반영된 설계도면, 시방서, 내역서(예산절감내역 전․후 대비표 포함)

나) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

3) VE 활동 기간 중에 수급인의 주요 업무 내용

가) VE 준비단계에서 VE 검토 수행자로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 요구되는 각종 정보를 충실히 제공해야 한다.

나) VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 VE 검토 수행자에게 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다.

(특히, 기술적 부분이 주요 논제가 될 경우에 설계팀의 각 전문가들도 함께 참석해서 설명할 수 있다.)

다) VE 실행단계에서 발주기관으로부터의 VE 제안서의 조치계획서를 작성하고 이를 발주기관에 제출해야 한다.

라) 수급인이 만약 VE 제안을 거부할 경우에는 명확하고 타당한 이유를 밝혀야 하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출해야 한다. 또한 승인된 VE 제안에 대해서는 즉각적인 수정 설계를 해야 한다.

마. 수급인은 과업과 관련한 건축 인허가, 각종 심의 등의 필요한 서류를 작성하고 대행해야 한다.

바. 각종 서류조사

1) 토지대장, 지적도, 등기사항전부증명서, 토지이용계획 확인원, 지방자치단체 조례 등을 조사해야 한다.

2) 유사 건축물의 공사비, 평면, 입면 등 계획에 필요한 사항을 조사해야 한다.

3) 기후 관련사항(기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등)을 조사해야 한다.

사. 수급인은 향후 준공 시 세움터(건축행정시스템)에 준공 자료등록 등을 협조해야 한다.

제4장  작성요령

1. 공통사항

가. 국토교통부 고시 제2016-1025호(2016.12.30.) 「건축물의 설계도서 작성기준」을 준수해야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 “기본업무 설계도서”와 과업을 위해 필요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 각 과업 단계별 설계도서 구성 등은 아래 내용을 반영해야 한다.

2. 계획설계

가. 정의

"계획설계"라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료를 바탕으로 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에 제안하여 승인을 얻는 단계이다.

나. 일반사항

1) 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 계획설계를 진행해야 한다.

2) 수급인은 부지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고하여 계획설계를 진행해야 하며, 3개 이상의 대안을 제시한 후에 발주기관의 승인을 얻어야 한다.

3) 발주기관이 제출한 3개 이상의 대안이 부적합하다고 통보 할 경우에 수급인은 7일 이내에 새로운 2개 이상의 대안을 재작성해야 한다. 이에 따른 과업기간 연장은 인정하지 않는다.

4) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완하여 제출하고 발주기관의 승인을 얻은 후에 중간설계를 진행해야 한다.

다. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련 문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행해야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사해야 한다.

- 해당 관청 및 사업시행자로부터 부지와 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획 확인원, 등기사항전부증명서, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사해야 한다.

나) 현장조사

- 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 부지 내 경작물, 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 부지 전경을 촬영․보관해야 한다.

- 주변과 환경적 조화를 고려하여 주변 건축물의 외관적 특징을 조사해야 한다.

- 주변 건축물이나 공작물, 공사 진행 과정에서 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사해야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사해야 한다.

- 부지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 이를 기록해야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 과정에서 현장조사보고서로 작성해야 하며, 종결보고서에 첨부해야 한다.

라. 측량조사방법

1) 일반사항

가) 측량을 실시하기 이전에 실시계획서를 작성하여 사전에 발주기관과 협의한 후에 현지측량을 실시해야 한다.

나) 과업지시서에 따라 조사하며 지시서 내용에 명기되지 않는 사항은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 및 기타 관련규정에 따라 시행해야 한다.

다) 과업지시서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단될 경우에는 그 사유를 서면 제출하여 발주기관의 승인을 얻은 후에 실시해야 한다.

라) 지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사해야 한다.

마) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적의 10% 이상을 여유 있게 측량해야 한다.

2) 조사측량

가) 경계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 기준으로 한국국토정보공사에 측량을 의뢰하여 결과물을 제출해야 한다.

나) 현황측량(평판측량)은 부지 내외의 평면 형상 및 고저 관계를 나타내는 지형측량과 부지 내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 해야 한다.

- 축척은 1/1,000로 하고, 과업면적의 10% 이상을 여유로 측량해야 한다.

다) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주기관과 협의한 후에 결정해야 한다.

라) 임시 수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치해야 한다.

마) 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출해야 한다.

바) 현황측량은 다음 사항을 준수해야 한다.

- 경계점은 구분점마다 측량해야 하며 수준점은 고저차가 발생되는 부위별로 표기하고 지장물 현황도 등은 지장물별로 표기한다.

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량성과는 「공간정보관리법」에 의한 국토지리정보원 고시 제2022-970호의 「공공측량 작업규정」이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시해야 한다.

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입해야 한다.

사) 지적의 복제

- 기 조사된 지적도와 현황 측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입해야 한다.

3) 표시항목

가) 측량 성과도에는 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기해야 한다.

4) 기타사항

가) 인허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 이에 따르는 제비용은 수급인 부담으로 해야 한다.

나) 조사내용 중 하자가 발생할 경우에 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완해야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우에는 발주기관의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토해야 한다.

3. 중간설계

가. 정의

“중간설계(「건축법」 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 얻는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획설계를 기초로 작성하되 발주기관의 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성해야 한다.

2) 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시해야 한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시해야 한다.

5) 기계, 전기, 통신 등의 장비 용량산출과 구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고 자료 및 도면을 첨부해야 한다.

6) 공용(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비배치도를 작성하여 발주기관의 승인을 얻는다.

다. 지질조사

1) 일반사항

가) 지질조사는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, NX 4공, 하향탄성파 탐사 1회)와 기존 조사내용을 첨부하여 작성하고 발주기관의 승인을 얻은 후에 실시해야 한다.

나) 현장시추작업 시 반드시 현장에 설계과업 책임기술자가 참석해야 하고 현장시추일정을 발주기관에 보고하여 발주기관에서 입회가 가능하도록 해야 한다. 발주기관 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계과업 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전 과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주기관에 보고해야 한다.

다) 지질조사는 「엔지니어링산업진흥법」에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링 활동주체 또는 「기술사법」에 따라 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행해야 한다.

라) 지질조사는 발주기관이 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품(발주기관으로 직접 제출)해야 한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 발주기관의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영해야 한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

마) 수급인은 현장 지질조사 완료한 후에 그 결과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계공법을 제시해야 하고 발주기관의 검토를 받은 후에 인쇄해야 한다.

바) 지질조사 시 책임기술자가 상주해야 하고 지질조사의 시험 등은 관련법규에 따라 시행해야 한다.

2) 지질조사 방법

가) 지질조사는 계획설계에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 실시함을 원칙으로 한다.

나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되, 지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중 장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 발주기관의 승인을 얻은 후에 조정할 수 있다.

다) 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 연암 2.0m이상까지 실시해야 한다.

라) 수급인은 현장 지질조사 및 실내시험을 완료한 후에 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시해야 한다.

마) 수급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

바) 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 「건설기술진흥법」, 「한국산업표준」, 토질조사 관련규정 및 발주기관의 지시에 따라 시행해야 한다.

사) 수급인은 지하암질의 분포상태, 연약층의 유․무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공해야 한다.

아) 시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 지정하여 실시하도록 하고 토층여건과 변화에 따라 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

자) 토질조사, 보링, 시추 및 표준관입시험을 원근에 따라 1개소 당 2매 이상을 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 제출해야 한다.

차) 조사 설계의 토층, 심도, 원위치 시험, 실내시험 등은 추정치로 조사결과에 따라 설계에 맞추어 정산해야 한다. 단 증가된 사항은 인정하지 않는다.

카) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

- 조 사 명

- 조사기간

- 조사위치

- 조 사 자

- 시 행 자

- 시추번호

- 시추장비명

- 각 채취시료의 위치 및 심도

- 시추 중에 나타난 층의 관찰

- 지하수위 : 시추 완료 후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

- 코아 회수율 및 천공속도

- 앞 층 천공압력 및 비트 회전속도

- 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

- 시추 중에 판단하는 토층 및 암층분류

- 토층 및 암층의 심볼위치

타) 수급인은 현장조사 및 실내시험 완료한 후에 결과를 종합 분석하여 공사비 산출 및 기초구조가 경제적이고 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성해야 한다.

파) 수급인은 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록해야 한다.

- 조 사 명

- 조사시행자명

- 조사요약 보고문 : 수급인 대표 및 기술자의 인명날인

- 조사개요

- 조사세부내용 및 기타

◦ 지층분포상태 및 지층의 특성

◦ 지하수위 분포

◦ 표준관입시험 결과

◦ 기초형태에 대한 제안

◦ 기초지반의 지지력

◦ 하향탄성파탐사 결과

- 제시험의 성과표

- 시추주상도

- 조사현황 사진

라) 지질조사보고서는 별도로 제출해야 한다.

3) 지질조사시험

가) 자연시료채취

- 연약 점토층에서는 시추조사와 병행하여 ‘실내 시험용 불교란 자연시료’를 채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지해야 한다.

나) 지하수위측정

- 시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24시간, 48시간 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정해야 한다.

- 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간에 걸쳐 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악해야 한다.

다) 표준관입시험

- 표준관입시험은 KSF 2318 규정에 따라 실시해야 한다.

- 시험횟수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층 이라도 1.5m 깊이마다 1회씩 실시해야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격횟수를 기록한다.

라) 하향 탄성파 탐사

- 하향 탄성파 탐사는 탄성파의 발생, 특히 횡파의 발생이 용이하고 비교적 측정이 간단하며 자료처리가 단순하여 지반의 탄성파 속도측정 및 이를 이용한 동 탄성계수를 산정해야 한다.

마) 시험의 종류

- 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석, 일축압축, 다운홀테스트 등

바) 토질시험

- 표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KSF 규정에 따라 실시해야 한다.

사) 암석시험

- 채취된 암석코어 시료에 대한 시험은 공인규정에 따라 실시해야 한다.

아) 기타시험

- 토질 및 암석시험은 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다.

자) 시료상자 정리

- 시료상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석코아를 채취심도 별로 구분 보관해야 하며 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부해야 한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영해야 하며, 암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 해야 한다.

- 암석코아가 아닌 슬라임 만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관해야 한다.

차) 사진촬영

- 조사 전․후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전 과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리해야 한다.

4) 기타 유의사항

가) 수급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

나) 보링주상도에 사용하는 심볼(symbol) 등 각종 표시 및 기호는 표준기호를 사용해야 한다.

다) 수급인은 현장조사 및 실내시험이 완료되면 성과를 종합 분석한 보고서를 제시해야 한다.

라) 수급인은 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록해야 하며 책임기술자가 서명 날인해야 한다.

- 조사명, 시행자명, 개요, 세부내용, 성과분석, 제 시험 성과표, 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 현황 사진, 보링 코아사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

라. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 부지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사·분석 및 검토한 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용

- 개략 공사비 산정(일위 대가표는 불필요)

※ 공종별 개략 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 부지가 면하는 도로의 위치와 폭, 부지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출 표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천장, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 부지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 시공방법

- 개략 공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물

라) 개략 설계내역서 : 내역서, 수량산출근거 및 기타 산출근거

마) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 각공종별 평면도, 배수계획도, 포장계획도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함)

- 주요 구조물 단면상세도

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 부지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 개략 공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 내역서, 수량산출근거 및 기타 산출근거

다) 도면종류

- 배치도, 종단면 및 횡단면도

- 위치도

- 공종별 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 주요 구조물 단면상세도

- 수목 식재 계획도

4) 기계설비

가) 설계설명서

- 설비 개략 공사비, 수급인의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서, 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토한 후에 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함해야 한다.

- 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명해야 한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV, 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함해야 한다.

- 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전 대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명해야 한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하고 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성해야 한다.

2) 축척에 따라 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록해야 한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정해야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부해야 한다.

5) 납품 전에 발주기관이 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응해야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주기관과 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계설명서

- 공사개요 : 위치, 부지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등을 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 부지가 면하는 도로의 위치와 폭, 부지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 점(Bench Mark), 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천장, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천장평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 및 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척:1/50정도)를 작성해야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계설명서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계 내용에 반영

라) 시방서

마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 등 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계설명서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 기존 수목 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서, 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도), 기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조 평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함해야 한다.

- 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 공사시방서(자재시방과 특기시방으로 구성하여 한권으로 작성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명해야 한다. 단, KS 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기해야 한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도, 배치도, 결선도, 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위 대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV, 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함해야 한다.

- 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전 대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(자재시방과 특기시방으로 구성하여 한권으로 작성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명해야 한다. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기해야 한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도, 결선도, 각종 기기의 상세도, 평면도, 단면도

: 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

제5장  납품 도서 목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획설계 검사원	-	1	부	<서식 4> 참고
2	계획설계(안) 3개	A3	2	부	개략적 조감도 및 스터디 모형 포함
3	현장조사보고서	A4	2	부	유사시설 견학보고서 포함
4	현황측량성과도	-	2	부	현황측량성과도, 경계측량성과도(한국국토정보공사 발행) 포함
5	관련법규 검토서	A4	2	부
6	추정공사비 내역서	A4	2	부

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계 검사원	-	1	부								<서식 4> 참고
2	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
4	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
5	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방
7	지질조사보고서	A4	5	부		◯
8	주요공법, 장비, 자재선정 보고서	A4	1									예산비교, 대안제시 및 선정사유 등

※ 건축도면에는 전 공종을 포함하여 전체를 제본해야 한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 부분만 제본해야 한다.

3. 실시설계 납품도서

가. 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	실시설계 검사원	-	1	부								<서식 4> 참고
2	최종보고서	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
3	설계설명서	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	관련 인허가 증빙자료
4	설계도면	A1	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
		A3	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이 또는 평철
5	계산서	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	관급내역서 별도
7	수량산출서	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출기준서	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	지정 양식에 따라 작성
9	단가산출서	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위 대가표	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	특기시방서	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	8	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	조감도		4	부	◯							표구 포함 (0.6m*0.9m이상)
15	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
16	CD-ROM		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
17	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	기계,전기,통신 관급도면 (A3반접) : 3부 추가
18	각종인증관련 서류		1	식

1) 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5매와 원본파일을 CD 또는 USB로 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 따라 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 CD 또는 USB로 제작하여 제출

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 과업의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등을 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철해야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출해야 한다.

공정표는 건축시공분야의 기술사 또는 특급기술자 이상 자격자가 공정계획에 대하여 검증해야 하며 출력물에 날인하여 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 USB에 포함되어야 한다.

라. 공사개요서 및 공사별 현장설명서(A4) : 발주기관 요구 부수

마. 조감도(A1 이상, 표구 포함) 3부

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

사. 물량내역 수정입찰에 해당하는 경우에는 관련자료 및 물량심사 시 필요한 자료 제출

아. 기타 발주기관이 요구하는 결과물(투시도, 모형 등)

<서식 1>

보 안 각 서

1. 용  역  명 :

2. 계약  일자 : 20  .   .   .

3. 착수  일자 : 20  .   .   .

4. 완수예정일 : 20  .   .   .

본인은 상기의 과업에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1) 과업수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 이와 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2) 과업을 수행함에 있어 과업수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 따라 과업수행 기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3) 과업수행과 관련하여 습득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 「건축사법」 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 따라 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4) 과업수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5) 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 계약서에 따르며 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20  년    월     일

주        소 :

생 년  월 일 :

기 술  분 야 : (참여공종 표기)

성        명 :                   (인)

고창군수 귀하

<서식 2>

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 성        명 :

2. 주        소 :

3. 주민등록번호 :

4. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 설계용역의 책임기술자로 선임하며 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

고창군수 귀하

<서식 3>

하도급 승인요청서

1. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

2. 하도급금액 :

3. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 인에게 ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 조달청 건설용역과-1523호(2020. 3. 3) 「국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건」 제5조에 따라 요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

고창군수 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 검토내용
검토사항		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증		-
하도급 수행에 필요한 자격요건		「기술사법」 및 동법시행령 「엔지니어링산업진흥법」 및 동법시행령 「소방시설공사업법 시행령」
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		「건설기술진흥법」 제21조 (건설기술인의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		「건설기술관리법」 제6조의2 (건설기술자의 신고) 「소방시설공사업법시행령」 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		「하도급거래 공정화에 관한 법률」 「건설산업기본법 시행규칙」 등
하도급 사유		「건축법」 제67조(관계전문기술자) 「건설기술(설계)용역계약특수조건」 제5조

<서식 4>

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :             원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

붙임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

고창군수 귀하

<서식 5>

주간 공정보고

□ 과 업 명 :

□ 과업개요

◦현장위치 :

◦과업기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 :            원

□ 과업진행사항

구 분	전주 진행사항(20 . . .)	금주 예정사항(20 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정, 예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

고창군수 귀하

<서식 6>

월간 공정보고

□ 용 역 명 :

□ 과업개요

◦현장위치 :

◦과업기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 :            원

□ 과업진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시,예정공정)
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

고창군수 귀하