- 국립군산대 지역연계 복합센터 건립 사업 -

설계용역 과업지시서

2025. 6.

목차

I. 과업개요	1

1. 과업의 명칭

2. 과업의 목적

3. 과업의 내용

4. 과업의 위치

5. 과업의 범위

6. 과업준수사항

7. 설계 경제성검토

8. 설계 안전성검토 등

9. 발주기관(이하 발주자) 및 연락처

10. 과업기간

II. 일반사항	14

1. 공통사항

2. 제출서류

3. 업무보고 및 회의

4. 조사 및 자료수집

5. 보안성 검토

III. 과업의 세부지침	22

1. 설계기준

2. 설계도서 표기

3. 도면작성 및 서명

4. 기타 유의사항

5. 분야별 설계 일반사항

6. 분야별 설계 세부사항

IV. 설계별 설계도서	45

1. 계획설계

2. 중간설계

3. 실시설계

4. 성과품 작성

과업개요

1. 과업의 명칭 : 국립군산대학교 지역연계 복합센터 건립사업 설계용역

2. 과업의 목적

◦ 국립군산대학교의 지역과 함께하는 복합시설 랜드마크로서의 품질과 품격을 확보하고 아울러 주변 건축물 및 환경과의 조화로움과 예술성, 작품성을 갖춘 창의적인 건축물 설계

3. 과업의 내용

가. 위    치 : 전북특별자치도 군산시 대학로 558

나. 지역지구 : 자연녹지지역, 대학(저촉)

다. 대지면적 : 전체 대지면적 801,900㎡ (사업부지 6,300㎡)

라. 용    도 : 교육연구시설 (복합센터)

마. 사업규모 : 8,000㎡(사업예산범위 내 발주자 요청에 의해 변경될 수 있음)

바. 층    수 : 자율제안 (지하 1층 고정)

- 사업규모와 부지여건 등을 고려하여 수요기관의 자료를 참조하여 제반법규에 적합 하도록 하고 또한 본 건물이 신규부지 내에 위치함으로 주위 건물과 조화를 맞춰  건물높이 등 층수 결정

※ 설계용역자(수급인)는 추후 세부소요면적 및 최상의 디자인 등을 조사하고 고려

하여 대학 실정에 맞는 최적의 층수를 산정해야 한다.

※ 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.

사. 예정 공사비 : 25,191,000천원 (전기공사비 제외, 부가세, 관급자재 포함)

- 제시된 예산액은 건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 조경, 폐기물, 철거, 지질조사 등에 대한 총공사비이며, 각종(수도, 가스 등) 인입비용을 조사하여 시설 분담금 으로 시설비에 포함하여야 함(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변동될 수 있음)

※ 전기공사는 별도 발주 예정

- 예정공사비를 준수하여 계획하여야 하며, 당선시 공사발주 시점까지 예정공사비를 초과하지 않도록 관리해야 하며, 낙찰차액을 감안해서는 안 됨 (예정공사비를 초과할 수 없음)

- 예정 공사비를 초과하면 그 사유와 해결 방안을 제시하여야 하며, 또한 예산상 공사비에 미치지 못하면 추가로 학교에서 과업을 요구할 수 있다.

- 총사업(공사비) 조정 협의 시 관련 검토 자료를 작성한다.

※ 각종 수수료 발주처 별도지급(설계안전성검토수수료, BF예비인증 예비인증수수료, 녹색건축 예비인증 수수료, 에너지절약계획서 검토 수수료, 제로에너지건축물 예비인증수수료)

아. 예정 설계비 : 공고서 참조

※ 본 설계 용역비에는 아래 ‘설계 주요 과업내용’이 포함되어 있으며 ‘설계 주요 과업내용’을 수행하지 않으면 감액하여 정산함

※ 본 설계비는 예정금액으로 본교의 사정에 의하여 변경될수 있으며, , 예비인증(녹색건축물인증,  제로에너지인증), 에너지절약계획서 작성비, 장애물 없는 생활환경인증, 손해배상보험료, 설계 안전보건대장 포함,  인허가 및 준공서류 작성, 행정절차 이행 및 기타 발주처가 필요시 요구하는 각종 자료 등 일체의 비용 포함

- 계획, 중간 및 실시설계 도서 작성(건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 조경 등) :

- 건축법 제29조에 의한 건축협의(허가) 및 건축물대장 생성, 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항, 각종 심의 및 수행비용 일체 포함

- 에너지절약계획서 작성업무 및 성과물 작성

- 설계 사전조사 업무

- 실시설계 기술제안 입찰안내서 작성 및 공사발주를 위한 자료 협조

자. 설계기간 : 착수일로부터 390일(공휴일 포함)

- 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주처의

요구에 응해야 한다.

- 설계용역 수행 완료 전, 모든 분야의 내역검토, 기간을 별도로 두어 내역을 정확        하게 산출해야 한다.

※ 내역 산출의 오류 등 설계용역을 부실하게 수행하여 시공과정에서 잦은 설계변경을 유발하거나 사전조사를 소홀히 하여 설계부실을 유발하면 “국가를 당자자로 하는 계약에 관한 법률 제27조”의 규정 및 “건설기술관리법” 제20조의4의 규정에 따라 입찰 참가자격을 제한하고 용역업무의 수행을 일정기간 제한 당하는 조치를 받을 수 있다.

차. 공사기간 : 착공일로부터  24개월(공휴일 포함)

※ 공사 발주준비 및 착공(1개월) / 신축 공사(22 개월)  / 시운전(1개월)

4. 과업 위치(범위)

※ 신축 위치는 부지 구획 내 모든 가능성을 열어두고 창의적인 설계 가능

5. 과업의 범위

본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 관계기관과의 사전협의 및 각종

심의 및 인ㆍ허가에 필요한 서류작성 및 제출, 제반 협의를 포함한 인ㆍ허가 처리업무

로 함

※ 설계용역 성과물은 제반 인․허가 및 심의를 득한 성과물이어야 함

※ 건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 조경, 폐기물, 노후시설 개선 등 제반분야 일체의 비용을 포함함

※ 용역수행 각 단계별 설계 공정계획을 수립하여야 함

가. 다음 공사를 설계(계획, 중간, 실시)의 기본 과업으로 함

- 건축공사 : 건축물 내ㆍ외부 공사, 마감재 공사, 가설공사, 장애인편의시설공사 등

- 토목공사 : 토공사, 오ㆍ우수공사, 포장공사, 토목구조물, 부대공사, 현황측량 등

- 기계설비공사 : 기계설비 전반, 소방설비(기계분야) 등

- 정보통신공사 : 통합배선, 방송 및 음향설비, CATV, 초고속 유ㆍ무선인터넷 등

- 조경공사 : 식재, 조경시설물, 야외 활동공간, 주차장시설 등

- 철거공사 : 수직·수평증축에 따른 건축, 토목 및 노후개선 관련 철거 및 폐기물처리공사

※ 전기공사 별도 발주예정

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문ㆍ심의, 영향평가 등과 관련한 업무를 작성 지원 하여야 함

다. 현장여건 조사

라. 에너지절약계획서 작성업무 및 성과물을 제출하여야 함

마. 인ㆍ허가 및 심의자료를 작성 및 제출하여야 함

본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인·허가 및 심의업무는 과업수행자가

대행하며, 각종 영향평가의 증빙자료 등 제출과 평가 결과를 반영한 설계도서 작성

하여야 함

수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련

법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 등 인ㆍ허가를 취득

하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 착수보고시

제출하여야 함

※「건설기술 진흥법 시행령」제75조의2(설계의 안정성 검토) 허가 등 확인

- 본 과업과 관련된 재해영향평가 등 각종 영향평가, 도시계획시설 결정(변경) 및 실시계획 인가를 실시할 경우 설계자는 각종 용역업체와 협의하여 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 함(각종 인허가 관련 필요 여부 검토 포함)

- 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성, 인장 날인 등 발주처의 업무 대행

- 각종 인증 취득 업무 대행(녹색건축인증(일반 등급, 예비인증), 제로에너지건축물 인증(4등급, 예비인증), 에너지절약계획서, 장애물없는생활환경인증(일반등급, 예비인증)) 등

- 기본 싸인물 설치 위치 제안 및 협의조정

- 도시계획시설사업 실시계획 인가(협조)를 위한 자료작성 및 인·허가 업무 수행하여야 함

과업수행자는 본 용역이 완료된 후에도 관청 인․허가 (협의사항)에 따른 서류보완,

변경사항 발생 및 발주처의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 함

설계 경제성검토(VE)

- 건설기술진흥법에 따른 설계VE검토를 시행 업무 수행에 필요한 설계 자료를 제시하고, 각종 제출 자료 작성과 협의 업무(회의참석, 자료제출, 검토 결과의 설계반영 등)를 수행하여야 하며, 채택된 제안에 대한 내역산출, 설계내용에 반영 후 결과를 제출하여 함

설계 안정성검토 – 설계안전보건대장 작성

- 산업안전보건법에 따라 총공사비 50억원 이상인 건설공사의 경우 건설공사 설계단계에서 제1호에 따른 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로 하여금 유해ㆍ위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성 및 업무에 협조하도록 하게 하고 이를 확인하여야 함

6) 설계적정성 검토

- 총사업비 관리대상 사업에 해당하는 경우(총사업비 200억 이상) 총사업비 관리지침에 따른  설계적정섬 검토를 받을 수 있는 검토 자료를 작성하고 협조하여야 함.

※ 총사업비 관리대상 건축사업의 계획설계, 중간설계, 중간설계가 완료되거나, 실시설계가 완료되면 조달청장에게 설계적정성 검토 자료를 제출한다.

7) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인·허가(협의사항)에 따른 서류 보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

※ 수급인은 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성, 인장날인 등 본 공사 도급자의 허가 증빙 관련 자료를 전달받아 행정업무(완료보고, 세움터 등록 등)을 주도적으로 시행하여 사용승인을 취득해야 한다.

- 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관(감독관)이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

- 건물 각실별 명세표 작성(전체 건물에 대한 공간 각실별 명세표를 작성 제출)

- 설계설명서에 의장(색채) 계획서, CPTED 설계보고서 포함하여 제출하여야 한다.

바. 기타 사항

- 설계와 관련한 각종 용역진행에 대한 업무 협조(회의참석, 자료제출, 용역 결과의       설계반영 등)

- 공사 발주와 관련, 발주 공종별 현장설명서 작성 및 적정 공사기간(예정공정표 포함) 산출

- 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

- 현황 측량 및 지질 조사는 시행 전 반드시 수요기관과 협의 후 진행한다.

- 지열 설계 시 시험천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서를 작성 (필요시) 하여 제출하여야 한다.

- 신재생에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법 시행령에 따라 총 에너지 사용량의 법적 비율에 맞게 신재생에너지로 공급되도록 설계하여야 하며 에너지 사용 추정 계획서를 작성하여 제출하여야 한다.

- 녹색건축물 조성 지원법 및건축물의 에너지 절약설계기준에 따른 에너지 절약계획서 및 설계 검토서를 작성제출한다.

사. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항 및 발주처가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 토론회·위원회 등발표자료 작성과 조치사항을 설계도서에 반영하여야 함

아. 과업수행자는 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품하여야 함

※ 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이,건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 다음 경우에는 발주기관 또는 수요기관이 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있음

- 기술용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

- 기술용역계약일반조건 제24조(불가항력)

- 기술용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시정지)

- 기술용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 기술용역 정지 등)

- 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

6. 과업의 준수사항

(1) 기본 준수사항

1) 용역수행자는 건축물의 배치, 규모, 형태, 색채, 재료, 건축설비, 구조 등에 대하여

주변과의 조화, 경관, 안전성, 기능, 관련법규 및 규정, 경제성 등을 감안하여 최적

의 미와 성능을 발휘할 수 있는 디자인으로 설계하여야 함

2) 설계 납품 전에 관계법령에 해당되는 모든 행정절차[설계 심의, 계약심사 등〕이행

후 반영될 사항은 최종성과품에 반영하여야 함

3) 본 용역 설계진행 중 각 분야별(건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 조경)로 사전

협조하여 용역 성과품 품질향상을 위한 중간검토를 받아야 함

4) 건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 조경 등 전문분야는 등록된 국가기술자격법에

의한 해당분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄

하여야 함

5) 본 과업을 수행함에 있어 본 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과

협의하여 수행하여야 함

6) 건축 협의(실시계획 인가(협조)) 등에 대한 사항은 용역사업 종료 전까지 협의 등 절차를

마치되 부득이한 사정으로 지연될 때에는 발주기관 업무담당자와 협의하여 정함

7) 본 용역 수행 중 필요 시 자문 또는 협의에 응하여야 하며, 협의 및 요청 내용에

대한 설계 반영사항을 날인 후 문서화하여 발주기관에 제출하여야 함

8) 본 과업의 시설물 특성상 사용자의 업무특성을 감안하여 친환경 에너지 절약, 흡 ·배기 및 냉․난방시설, 화재 시 내화시간과 피난의 중요성을 인지하고 관련업체와 협력하여 설계에 반영하여야 함

9) 설계자는 ‘공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토부 고시 제2024-1021호)’제4조 제1항에 의거 공사기간에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 고려하여 공사기간의 산정 및 산출근거를 설계 성과품의 일부로 제출하도록하여야 함

10) 건축 인허가 및 착공, 준공 업무를 지원하여야 함

11) 상세시공도서 및 시방서를 작성하여야 함

12) 조감도(A1) 및 각종 보고용 판넬을 작성하여야 함

13) 에너지절약계획서 검토 및 제출·작성하여야 함

14) 건축법 제48조(구조내력 등), 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 등 내진 관련

사항을 검토하여야 함

15) 건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00 : 2019)에 따른 비구조요소의 내진설계를

준수하여야 함

(2) 부대업무

1) 측량, 지반조사 및 지하매설물 조사 등 제공자료와 상이할 시 발주기관과 협의

하여 수행하여야 함

2) 본 과업의 수행과 관련한 각종보고회 개최 시 자료작성 및 보고에 따른 업무(착수

보고회, 중간보고회, 최종보고회, 수시보고 등)를 수행하여야 함

3) 기타 각종 자료의 작성 및 기술제공 등 과업수행에 필요한 사항을 작성하여야 함

4) 필요시 공청회 또는 설명회 개최에 따른 업무를 수행하여야 함

5) 용역 완료 전까지 관련법에서 정한 보험 또는 공제증서의 제출하여야 함

6) 기본 및 실시설계를 위한 외부 자문 시 자문에 필요한 절차 이행하여야 함

7) 공사 완료 후 준공도면 날인 및 건축물대장 작성 날인 제출하여야 함

8) 기타 필요시 사례 비교조사 제출 및 본 사업 적용․반영하여야 함

9)기술심의위원회에 따른 자료검토 제출, 보고 및 개최에 따른 업무를 지원

하여야 함

10) 계약심의위원회 자료작성 관련 업무를 지원하여야 함

11) 건설사업관리계획 수립 업무를 지원하여야 함

(3) 보 고

설계자는 아래 각 사항에 대하여 보고 후 검토된 과업을 진행한다.

1) 착수 보고	: 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최하며, 착수보고 시 책임기술자는 설계 진행계획을 설명하여야 한다.
2) 기초조사보고	: 설계자는 착수일로부터 20일 이내 현황측량, 지장물건 조사, 관련법규 검토 등 계획설계 전 사전검토사항을 작성･보고한다.
3) 계획설계보고	: 건축물에 대한 설계목표를 정하고 가능한 해법을 제시하는 단계로 2개 이상의 계획안을 발주자에게 작성･보고한다.
※ 설계공모의 경우 선정된 공모작에 공모심사위원 의견 및 발주처 요구사항 등을 반영한 계획안을 제출한다.
4) 중간설계보고	: 계획설계 계획안에 발주처의 요구사항을 반영하여 구체화한 서류를 작성･보고한다.
※ 설계자는 각종 심의, 인증 등 행정절차 이행을 위한 설계용역 정지 기간에도 진행사항을 보고하여야 한다.
5) 실시설계보고	: 발주처에서 제출된 납품도서로 입찰, 계약 및 공사에 필요한 업무를 수행할 수 있도록 설계 도서를 제작･보고한다.
6) 월별업무보고	: 설계자는 매월 첫째 주에 월간 업무수행사항 및 예정사항 등을 작성 제출･보고한다.
7) 수시 보고	: 기타 발주자로부터 보고 요구가 있는 경우 또는, 설계자가 설계 진행상 중대한 사항을 인지한 경우

마. 성과품 납품시기 : 계획, 중간,실시 설계도서 납품 (납기일: 발주처 제시)

※ 각종 심의, 심사, 협의 등 설계도서 납품 : 발주처와 협의

바. 각종 서류작성 및 행정절차이행

1) 설계자는 본 과업과 관련하여 각종 심의, 협의, 심사, 감사, 예비인증 등에 필요한 서류를 작성하여 관련기관(부서)에 제출･설명하여야 한다.

2) 설계용역 계약자는 설계와 관련된 각종 공청회 및 설계심의회에 참석하여 설명은 물론 자료를 작성하고, 보완 요구사항이 있는 경우는 이를 즉시 보완조치 하여야 한다.

3) 설계자는 설계기간 또는 완료 후에라도 공사 착공에 필요한 제반 행정절차(심의, 심사, 인․허가협의 등)가 조속히 처리될 수 있도록 적극적인 노력을 하여야 하며, 이를 수행함에 있어 발주자가 요청하는 사항 및 행정절차상 필요한 사항이 있을 시에는 이를 보완하여야 한다.

(4) 기타사항

1) “수급인”은 과업의 목적, 건축물 규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수

있도록 과학적이고 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 설계 용역 중 발주

기관 등 예측할 수 없었던 아래와 같은 사항 등으로 변경이 필요한 경우 즉시

서면질의 후 과업을 수행하여야 함

- 오폐수처리시설의 연결

- 예측 불가능한 지하매설물, 폐기물 등

- 우수관 및 배수시설 확인

- 계약내용의 누락 부분 등

- 기타 과업수행에 필요한 사항

2) 본 과업내용서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항, 건축법 등

관련 법률 등이 없는 한 본 과업내용서를 원칙으로 하고, 이의가 있을 때에는 서면

질의에 의하여 확인 후 수행하여야 함

7. 설계 경제성검토(VE)

가. 관련 근거

1) 「건설기술 진흥법 시행령」제75조(설계의 경제성등 검토)

2) 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」(국토교통부고시)

나. 실시 시기: 기본(중간)설계 , 실시설계단계에서 각1회(총2회)

다. 시행 방법

1) 수요기관에서 별도로 계약한 설계VE 전문용역업체 또는 설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침에 따라 조달청 조직으로 실시한다.

2) 설계용역 과업수행자는 설계VE 제안내용을 검토 후 설계에 반영한다.

라. 설계VE 활동 기간 중에 본 과업수행자의 주요 업무 내용

1) 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가 설계VE 전문용역업체로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공한다.

2) 설계VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계VE 전문용역업체(또는 자문위원단 등)에게 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다.

3) VE실행단계에서 설계VE제안서의 조치계획서를 작성·제출한다.

4) 계약상대자가 검토 후 설계VE 제안사항에 대하여 적용 제외할 경우 이에 대한 타당한 이유를 밝히고, 이를 위한 기술적 증빙자료도 제출해야 한다. 또한 승인된 VE제안에 대해서는 즉각적인 수정 설계를 착수한다.

5) 조달청의 설계적정성(계획·중간·실시설계, 총 3회) 제안사항에 대하여 검토·반영한다.

8. 설계 안전성검토 (설계 안전보건대장 작성)

가. 근거 규정

1) 산업안전보건법 제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방조치) 제1항

- 총공사비 50억원 이상인 건설공사의 경우 건설공사발주자는 산업재해 예방을 위하

여 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에 따른 조치를 하여야 함

나. 실시 시기 : 건설공사 설계단계

다. 시행 방법

1) 건설공사 계획단계에서 작성된 기본안전보건대장을 설계자에게 제공하고, 설계자로

하여금 유해ㆍ위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장을 작성하게 하고 이

를 확인하여야 함

9. 제로에너지건축물 설계

가.  “「녹색건축물 조성 지원법 시행령 제17조」(녹색건축 인증대상 건축물)”에 의거 공공기관에서 건축하는 연면적 500㎡ 이상의 건축물은「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 제로에너지 건축물 인증을 취득하여야 한다.

나. 본 과업수행자는 제로에너지 인증 요청을 위해 필요한 서류를 작성하여 관련 인증   기관에 신청하고 예비인증을 받아야 한다.

다. 제로에너지건축물 인증 평가 기관에서 인증 검토과정 중에 인증 취득을 위해 설계  수정이 필요할 경우 이를 즉시 반영하도록 한다.

라. 제로에너지건축물 예비인증 컨설팅비용 등은 설계용역사에서 부담한다. 단, 제로에너지건축물 본인증 취득 컨설팅비용은 공사 도급 내역서에 반영하여야 한다.

10. 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제10조의2」(장애물 없는 생활환경 인증)

2) 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙

나. 본 과업수행자는 장애물 없는 생활환경 인증 요청을 위해 필요한 서류를 작성하여 관련 인증기관에 신청하고 예비인증을 받아야 한다.

다. 인증 검토과정 중에 인증 취득을 위해 설계 수정이 필요할 경우 이를 즉시 반영하도록 한다.

라. 장애물 없는 생활환경 예비인증 컨설팅비용 등은 설계용역사에서 부담한다. 단, 본인증 취득 컨설팅비용은 공사 도급 내역서에 반영하여야 한다.

11. 녹색건축 인증

가. “「녹색건축물 조성 지원법 시행령 제11조의3」(녹색건축 인증대상 건축물)”에 의거 공공기관에서 건축하는 연면적 3,000㎡ 이상의 건축물은「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 녹색건축 인증을 취득하여야 한다.

나. 본 과업수행자는 녹색건축 인증 요청을 위해 아래의 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

1) 녹색건축 인증 신청서(「녹색건축 인증에 관한 규칙」서식 3)

2) 녹색건축 자체평가서 및 증빙자료

3) 기타 인증에 필요한 자료

다. 녹색건축 인증 평가 기관에서 인증 검토과정 중에 인증 취득을 위해 설계 수정이 필요할 경우 이를 즉시 반영하도록 한다.

라. 녹색건축 예비인증 취득 컨설팅비용은 설계용역사에서 부담한다. 단, 녹색건축 본인증 컨설팅비용은 공사 도급 내역서에 반영하여야 한다.

12. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 2024-110호)

2) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2024-1026호)

3) 녹색건축물 조성 지원법 제17조

나. ‘건축물의 에너지절약 설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리    공단과 에너지절약 사전협의 실시

1) 사전협의 내용

- 에너지절약형 설계

- 고효율에너지 기자재 사용

2) 제출서류

- 건축협의 시 제출하는 에너지절약계획서에 준용하는 도면과 근거서류

- 공공기관 신축건물 에너지 관련 사업협의 신청서

- 고효율에너지기자재 적용 Check List

- 관련자료 CD

- 기타 증빙서류

☞ 평가 진행 중 필요 시 서류 보완 및 설계 수정

13. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제83조 및「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제86조와「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제11조에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정․고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매하도록 규정하고 있으며,「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준(조달청 훈령 2105호, 2023.6.7. 개정)」에 따라 관급자재를 선정하여야 한다.

나. 설계자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를     적기에 작성, 제출하여야 한다.

14. 발주기관(이하 발주자) 및 연락처

가. 발 주 자 : 국립군산대학교 시설과

나. 주    소 : 전북특별자치도 군산시 대학로 558 (국립군산대학교 본부 3층, 시설과)

다. 전화번호 : 시설과 김형준 / 063 - 469 – 4095

15. 과업기간

가. 착수일로부터 공.휴일 포함하여 일(13개월)로 하되 기본설계, 실시설계 등 세부

기간은 협의하여 조정할 수 있음

나. 예정공정표

과업내용	착수일로부터 390일													비고
	기본설계						실시설계(210일)
	계획설계(90일)			중간설계(90일)
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390
사업부지 현지조사
기본구상 및 기본계획수립
계획설계
중간설계
실시설계
적산 및 내역서 작성
납 품

※ 발주기관의 사정에 따라 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주기관 의 요구에 응해야 함

※ 과업기간 변경 등은 “국가계약법” “(계약예규)용역계약 일반조건”에 따른다.

일반사항

1. 공통사항

적용요령

용역수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 과업수행자가 보다 합리

적인 방안으로 연구 발전시켜야 함

본 과업내용서에서 제시된 사항은 과업수행자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이

불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주처의 해석에 따라야 함

발주처 및 수요부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여 유도

및 보다 광범위한 의견을 집약하여 최상의 설계방안을 도출하여야 함

설계용역자의 성실 등의 의무

설계용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 건축물 및 관련시설의 미관,

에너지절약, 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고 본 과업의 질적 향상에 노력

하여야 함

계약 체결 후 과업 착수전에 착수계․사업수행계획표․용역수행자 명단 및 이력서,

보안각서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 제출하여야 하며, 과업의 수행을

위하여 투입된 사업 책임 및 분야별 책임기술자는 과업기간 중에 과업수행자가

임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주처의 사전 동의를 받아야

함

설계자는 과업수행 과정에서 발주기관이 구성한 설계 자문위원회가 구성된 경우

1회 이상 설계자문위원회에 자문하여야 하며, 지적·보완사항이 있을 경우 발주 기관의 지시에 따라 설계에 반영하여야 함

본 과업수행을 위하여 각 분야별 기술자가 주요시설을 조사하여 설계에 충분한

기초자료 수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임하도록 하되, 조사계획 등에 대하여

는 발주처와 사전협의를 거쳐 추진하여야 하며, 조사 후 결과 등을 보고서로 작성

하여 제출하여야 함

※ 발주처는 과업 수행자로 하여금 수요기관 또는 필요시 구성된 설계자문위원회를 통한 설계사항에 대한 적정성 검토 및 자문사항에 대하여 검토받을 수 있도록 할 수있으며, 발주처 착수․수시․중간․최종보고회 또는 수요기관 · 설계자문위원회 보고회를 병행 또는 별도로 개최할 수 있으며, 보고회 운영에 소요되는 경비는 과업수행자가 부담함

- 과업수행자는 설계자문위원회에서 제시된 의견에 대하여 설계의 반영 여부를 발주처에 제출하여 승인을 받아 설계에 임해야 함

- 본 과업수행 기간 중 발주처는 상기 내용과 별도로 필요할 경우 본 과업의 설계사항을 수시로 검토할 수 있으며, 이 때 필요한 자료는 과업수행자가 준비하여야 함

- 과업수행자는 발주처 및 사업의뢰기관에서 제시·요청하는 사항에 대하여 설계 진행 중 발주처 및 사업의뢰기관과 협의하며 본 과업과 유사한 국내 시설을 2곳 이상을 방문하고, 실제 운영사례를 조사한 결과를 제출하고 설계 반영하여야 함

2. 제출서류

과업수행자는 설계 진행 시 다음 서류를 제출하여야 하며, 본 용역사업 중에 필요한 설

계도면은 별도의 비용 없이 과업수행자가 발주자에게 제공하여야 함

가. 착수시

1) 과업수행자는 용역착수 시 다음의 서류 2부를 착수일에 발주기관으로 제출하여야 함

- 착수계 1부

- 보안각서(보안계획서 포함) [붙임 1] 각 1부.

- 책임기술자 선임계 [붙임 2] 1부

- 설계용역 참여기술자 현황(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 1부

- 과업수행계획서 1부.

- 과업수행 협약서 1부

- 설계용역수행 조직표(연락처 기재) 1부.

- 각 공종(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방, 신재생에너지 관련 용역 등)의 분야별 책임기술자명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등각 1부.

- 설계용역 예정공정표 1부.

※ 설계과업 일정에 맞게 예정공정표를 작성하여 승인을 득하여야 하며, 예정공정표에는 각 분야별 수행계획 및 검수일을 포함하여야 함

- 산출내역서 1부.

※ 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준으로 작성하고 분담 이행비율에 따라 분야별 용역수행 내역서를 포함하여 제출하여야 함

- 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

2) 과업수행자는 착수계 제출 후 7 일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, ‘가’호로 승인된 착수회의 자료 및 공모시 내용을 근거로 추후 설계방향 및 과업을 설명하여야 하며, 발주기관과 사전협의된 일정에 맞추어 진행하여야 함

나. 실시설계 제출 서류(설계도서 납품목록 포함)

- 실시설계 사전검토 체크리스트

- 설계검사원 [붙임3 서식]

- 현장조사 결과 보고서

- 실시설계도서 일체

- 도면, 내역서, 계산서, 시방서, 물량산출서, 단가산출서, 2개 이상의 비교 견적서 등)

- 설계안에 대한 조감도(실내 포함) [A1이상, 표구포함]

- 인허가용 설계도면 및 인허가 관련 서류 및 심의서류 일체

- 건축협의서(제반 인ㆍ허가 증빙자료를 포함함)

- 공사별 예상 공정표 (공기산출 근거 포함)

- 예산 초과 시 절감방안 검토서

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 (대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

- 관련서류를 포함한 저장매체 (USB)

- 기타 발주처의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

기타 서류

용역의 진도보고

- 주간공정보고 [붙임 4 서식]

- 월간공정보고 [붙임 5 서식]

업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

3. 업무보고 및 회의

과업수행자는 전 설계과정에서 정기적으로 진행사항을 구두 및 서면으로 보고하여야

하며, 주요공법, 자재선정 등 모든 설계과정에서 발주처와 충분한 협의를 통하여 발주

처가 의도하는 사항이 충분히 반영되도록 하여야 함

(1) 업무보고

1) 주간공정보고 : 발주처와 협의하여 주 간격, 날짜 등을 지정하여 붙임 양식에 의거

제출하여야 함

2) 월간공정보고 : 발주처와 협의하여 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정

사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출하여야 함

3) 수 시 보 고 : 설계용역 진행시 문제점 발생시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생

시 제출하여야 함

(2) 업무회의

가. 일반사항

1) 과업수행자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주처와 협의하고자 하는 경우

에는 발주처의 의견을 수렴하여 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단,

세부적인 공종별 설계 내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있음

2) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 과업

수행자 임의로 해석할 수 없으며, 발주처와 협의하여 결정하여야 함

본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는

자료를 제출하여 발주처의 승인을 받아 채택할 수 있음

과업수행자는 각종 회의시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의

하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 함

과업수행자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주처의 지적·보완·수정 요구사항에

대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 함

나. 업무 착수회의

1) 업무착수회의의 일정 및 내용 등은 착수일 또는 착수계 제출 후 발주처와 협의를

통하여 개최할 수 있음

2) 업무착수회의시 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 의도·방향 및 진행계획을

설명하여야 함

다. 중간․최종 보고회

1) 과업수행자는 발주처의 요구에 의해 설계용역 등을 보고자료로 작성하여 최소한

보고회 7일 전까지 발주처 담당자와 사전협의를 거친 후 설계용역 보고회를 개최

할 수 있음

수시회의

설계 진행 시 문제점이 발생하거나 단시일 내 발주처의 정확한 결정이 필요할

경우 필요한 자료를 작성·배부하여 협의하여야 함

과업수행 시 과업수행자 주관으로 세부 분야별 용역수행자와 주 1회 이상 합동 회의를

개최하여 상호 간의 의견을 조정하여야 하고, 회의내용은 발주처에 제출하여야 하며,

설계 내용이 각종 인허가 · 인증 등에 충분히 반영될 수 있도록 하여야 함

기타사항

발주처의 필요에 의거 설계용역과 관련된 기술적인 사항 검토, 전문가 검증, 디자인

향상 등을 위한 설계자문위원을 구성하고 회의를 개최할 수 있으며, 이때 과업 수행자는     발주처의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 함

설계 기간 중 수시회의에 관한 세부사항 등은 발주부서에서 별도 통보할 수 있음

(3) 관계사항 숙지의무

1) 과업수행자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야

하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 사항에 대하여는 과업수행자가 책임을

져야 함

2) 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주기관과 협의하여야

하며, 이견이 있을 경우 감독원의 의견에 따라야 함

기타 경미한 사항은 협의하여 시행하며, 이에 소요되는 비용은 과업 수행자가 부

담하여야 함

본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는 바 이에 규정되지 아니한

사항은 관련법규의 규정 및 건설공사 조사 및 시험규정, 한국공업 규격 및 관련

규정에 따라 감독원과 협의하여 수행하여야 함

본 과업을 수행함에 있어 과업수행자는 제반 여건조치를 하여야 하며, 본 과업

으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 과업수행자가 손실보상을 하여야 함

과업수행자는 설계심의 및 건축협의 등 각종 행정 절차상의 승인, 협의, 인․허가를

완료할 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하며, 필요시 관계기관의 협의에 따른

필요한 관련 자료를 작성 제출하여야 하며, 납품 후라도 행정절차 이행이 완료

되어야 본 용역 과업이 완료된 것으로 봄

과업수행자는 납품 후라도 설계 또는 오류 및 보완되어야 할 사항은 용역자 부담

으로 책임지고 설계보완 하여야 하며, 또한 본 공사 시공 중에 발생하는 제반

사항에 대한 설계내용을 자문할 경우 적극 응해야 함

감독원이 과업 수행 중 설계용역자의 고용인이나 하도급자가 과업수행에 부적당

하다고 인정할 때는 교체를 요구할 수 있으며, 용역자는 즉시 이를 교체하여야 함

설계도서 작성은 국토교통부 고시 제2016-1025호(‘16.12.30)의 설계도서 작성

기준에 의하여 작성하여야 하며 설계도면에 설계자, 제도자, 검수자, 확인자, 책임

기술자 등의 설계도서 작성자가 실명 날인 하여야 함

본 과업 수행상 발주기관의 사정에 의하여 일부 변경이 있을 때는 발주기관의

방침에 따라야 함

본 용역설계에 의하여 공사시행 중 주요사항이 누락되었거나 설계변경을 하여야

하거나 용역설계로 인한 피해가 발생될 시는 설계용역자가 피해보상을 하거나

변경 설계를 이행 하여야 하며 이에 따른 대가를 요구할 수 없음

용역기간 연장

가. 다음과 같이 부득이한 경우 외에는 용역기간을 연장할 수 없음

1) 추가과업, 특별업무수행, 조사 물량증가 등으로 용역기간 연장이 불가피 한 때

2) 관련법령에 따른 각종 심의, 인증 및 인·허가 등에 소요되는 기간

3) 천재지변, 일기불순 등으로 예측치 못한 작업일수가 계속될 때

4) 발주기관의 사정으로 작업중지 또는 연장의 필요가 있을 때

5) 기타 부득이한 사정으로 연장이 불가피하다고 발주기관이 인정할 때

6) 용역을 수행할 수 없는 기간에는 발주기관이 설계자에게 통보하고 통보된 날부터

용역기간에 산입하지 아니함

4. 조사 및 자료수집

(1) 현지답사

1) 과업수행자는 현지를 답사하여 계획한 시설물이 현지조건에 적합한지의 여부를

확인하여야 함

2) 과업수행자는 자연 상황, 주변 도로, 용지 조건 등을 상세히 파악하여 공사부지 내

작업장 등의 확보 가능 여부를 판단하여야 함

3) 현지답사 시에는 반드시 인접대지, 주변건물, 도로, 담장 등 시설물에 대한 균열       등 현황을 기록 · 정리하고 민원 발생 또는 설계시에 참조하도록 함

4) 과업수행자는 당해 대지에 대한 실제 현장조사 후 건설공사의 모든 단계에서

필요한 사항(인접대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타

건설공사 장애요인 등)을 발주처와 협의하고 해결책을 제시하여야 함

5) 과업수행자는 대지경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하 매설물, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사자료, 일반적 기록, 추가 정보 등을 참조하여 설계하여야 함

(2) 지장물 조사

1) 각종 지하매설물 및 지상의 지장물에 대한 현장 및 자료를 정확히 조사하여

설계에 반영하여야 함

2) 지장물 중 이설이 필요한 시설은 해당 기관과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업

비에 반영하여야 함

3) 공사시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 협의

하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 하여야 함

4) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 함

5) 조사항목은 다음과 같음

- 공공시설물, 통신, 상·하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

(3) 구조물 조사

1) 계획 대지 부근의 기존 건물을 비롯한 각종 구조물 현황과 문화재 현황을 조사

하여야 함

2) 각종 구조물 및 문화재가 계획 대지에 인접하여 있을 경우 문화재의 위치 등에

대한 상세한 사항을 현장 조사 및 관련 자료를 확보하여 조치계획을 발주처와

협의하여야 함

(4) 용지 조사

1) 발주처의 요구시 지장물 현황조서를 용지도와 함께 제출하여야 함

2) 우리도 및 해당 시․군의 각종 인·허가 및 심의 사항을 조사하여 과업수행에 차질이

없도록 하여야 함

3) 민원 발생 예정지역 및 협의 사항을 조사·검토하여야 함

관련계획 자료조사

1) 주변지역 내의 제반 사업계획을 조사하여 본 과업과의 연관성을 상세히 검토 후

반영하여야 함

2) 계획 대지와 관련한 도시계획의 현황과 토지이용계획 등을 상세히 조사·검토하여

사업계획에 반영하여야 함

기타 조사사항

1) 주변시설에 미치는 민원, 안전 등의 문제를 조사 검토하여야 함

5. 보안성 검토

가. 과업수행자는 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을

개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없음

나. 수급인은 보안상 다음 사항을 준수하여야 함

1) 착수시 보안대책을 수립하여야 함(착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서

첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 됨

3) 과업수행 중 발생하는 도면 및 서류 등의 폐기물은 소각하여야 함

4) 과업수행자는 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든

책임은 수급인에게 있음

과업의 세부지침

1. 설계기준

(1) 법령 등의 적용기준

설계자(과업수행자)는 「건축법」, 해당 지자체의조례,「정보통신공사업법」, 「소방 시설 공사업법」,「녹색건축물 조성 지원법」,「신에너지및 재생에너지 개발·이용 ·보급촉진법」, 「환경·교통·재해 등에 관한 영향평가법」등 당해 사업 관련된 법령과 각종 고시, 지침 등의 위배가 없어야 함

설계의 책임 및 손해배상

1)과업수행자는 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를

위반 시 기술용역계약 일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기

할 수 없음

2) 설계 용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가 과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

설계 용역비 변경 및 정산

본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할

때에는 과업수행자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 과업수행자는 발주기관의

방침에 따라야 함

발주기관의 요구에 의하여 과업 범위의 증감이 발생할 경우 예산의 범위 내에서

당해 계약금액을 조정 또는 정산할 수 있음. 과업범위의 현저한 변경이 없이 기본

설계 또는 실시설계 결과 과업 제시기준 공사비를 초과한 범위에 대하여는 용역

비의 증액 지급이 불가하며, 당초 설계용역비 산출때보다 면적이 감소될 경우 및

착오로 인한 과다계상이 발견될 때에는 계약된 용역비를 감액 조치할 수 있으며,

이에 대하여 건축사는 이의를 제기할 수 없음

(2) 일반지침

가. 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시 제2020-635

호」별표2의 단계별 도서내용의 도서작성구분을 기준으로 하되 발주처와 협의하여

부분적으로 항목 증감, 조정할 수 있음

나. 관련법규, 규정, 지침, 고시, 조례, KS규격 및 국토교통부 등 정부기관에서 제정한

관련 설계기준, 본 과업지침 및 각종 기술기준 이상으로 설계하며, 최신 개정기준에

의해 관계법규간 서로 상이한 경우에는 강화된 기준 이상으로 하여야 함

다. 과업 수행자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약

이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련 기관과 문서로 협의하고 설계

기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 함

설계는 관련법규와 용역계약일반조건, 발주처와 협의된 설계조건을 만족하여야

함. 만약, 설계 용역의 수행 과정에서 변경요인이 발생했을 경우 과업 수행자는

발주처에 그 내용을 보고하여야 하며, 관계법규 및 계약문서 검토, 해당기관 및

발주처와 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 함

본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을

준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안 되며

서면질의에 의하여 확인하여야 함

「건축법」시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에

관한 규칙」제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에

대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 함

건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방분야 등 각 분야에서 필요한 사항은 타공사

분야의 설계에 반영토록 요청하고 타분야 설계에 반영 여부는 요청한 분야에서

반드시 확인하여 누락 중복 등 오류가 발생하지 않도록 설계하여야 함

설계는 친환경 및 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로

하여야 함

자재 및 장비 선정 시 발주처와 반드시 협의하여야 하며, 협의 결과에 따라 각 자재

및 설비에 대한 비교 문서를 작성 후 제출하여야 함

설계 전 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 조사·

설계해야 하며, 사전조사 시 도로의 연결, 지반상황, 우·오수관 위치, 급수 인입점,

과거의 기상관련 통계자료 등을 검토하여 설계에 반영하여야 함

본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주처의 요구사항에 대해

적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 함

하도급의 범위

설계자는 본 용역과업과 관련된 모든 사항에 대하여 발주자의 사전승인 없이는

타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없음

설계자는 발주자로부터 사전승인을 득하여 하도급 계약을 체결한 경우 하도급으로

처리할 수 있는 사항은 다음과 같음

- 건축 구조 및 가설구조(흙막이 가시설, 비계, 동바리 등), 토목구조, 조경, 기계    설비, 통신 등 전문분야 업무

- 건설공사의 수량 및 견적 업무

- 전문 인테리어 설계 업무

- 기타 발주처에서 특별히 인정하는 업무

설계자는 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할

수 있으며, 설계자는 하도급된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 짐

하도급업체도 과업수행자와 동일한 보안, 설계, 손해배상의 책임이 부과됨

(3) 설계도서의 분리 작성

가. 발주단위에 대하여는 필요시 작성 전 발주처와 협의하여 결정하여야 함

나. 특정 폐기물처리 도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 함

2. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약 일반조건 제5조에 의함

나. 가능한 약어 사용을 지양함

※ 약어 사용이 필요한 경우는 다음에 따르며, 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 함

1) 건설업 분야에서 제정된 협약

2) 사전에 수록되어 있는 약어

3) KS규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수하여야 함

- 건축도면 : A

- 건축구조도면 : S

- 토목도면 : C

- 조경도면 : L

- 기계도면 : M (기계소방도면 : MF)

- 통신도면 : ET

인테리어도면 : EX

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이

용이하도록 하여야 함

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 토목, 기계설비, 통신, 소방, 조경 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련

하여 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를

작성

국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

3. 도면작성 및 서명

가. 제도용지는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용하여야 함

나. 도면규격은 A1, A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 하여야 함(도면에 표기)

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 함

라. 건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 등 도면은 발주처의 지시에 따라 동일한

축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 함

마. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 함

바. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이

용이하도록 하여야 함

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 토목, 기계, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해, 시공할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서

등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

4. 기타 유의사항

가. 발주처의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 과업수행자는 내역서 수정 등

발주처의 요구에 응해야 함

나. 도면, 시방서(일반시방서 및 특기시방서) 및 내역서 즉, 설계도서 상호간 자재, 규격,

공법 등을 필히 일치시켜야 함

다. 모든 품목은 일위대가표 작성을 원칙으로 하며, 전문업체 견적가격을 적용한 품목은

일위대가표로 작성된 해당 견적서를 첨부해야 함

라. 관급자재는 도급자 설치 관급액과 관급자 설치 관급액으로 구분하여야 함

마. 원가계산시 조달청 원가계산 제비율을 시점에 맞게 적용하여야 함

5. 분야별 설계 일반사항

(1) 설계 세부지침

가. 에너지 절약

- 계획 시에 부지의 환경조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용 합리화를 도모한다.

- 「에너지이용 합리화법」 제3조(정부와 에너지 사용자ㆍ공급자 등의 책무) 및 「고효율에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2024-153호.)」에 의하여 고효율기자재를 사용하여야 한다.

- 「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2024-110호)」에 따른 관련 사항을 설계에 반영하여야 한다.

나. 친환경(녹색) 건축

- 친환경 기준 : 「녹색건축 인증에 관한 규칙」 / 「녹색건축 인증 기준」 (국토교통부)

- 사용 연한의 확보 : 「건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부)」

- 신·재생에너지 설비 설치 : 연도별 신·재생에너지 공급 의무비율 준수

다. 건축물 사용 연한에 관한 고려

- 사용 연한의 확보

· 계획 시에 건축물의 사용기능을 검토하여 요구되는 시설의 용도, 기능의 확보에 대응할 수 있도록 한다.

· 계획에 있어서는 장기적인 사용기간을 상정하여 사용조정 및 용도변경에도 대응 가능토록 필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

- 내구성의 확보

· 계획 시에 건축물의 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축구조, 설비 및 건축 비(非)구조 부재의 합리적인 내구성 향상에 노력한다.

· 건축구조(구조체)에 있어서는 건축물의 내용기간 중 대규모 수선이 발생되지 않도록 내구성 향상에 특별히 유의하고 건축설비 및 건축 비(非)구조 부재에 있어서는 건축물 사용기간 중 수 차례 대규모 수선이 필요함과 균형 있는 수선 주기를 고려하여 합리적인 내구성을 확보할 수 있도록 한다.

라. 임산부 및 노약자에 대한 배려

- 주차장에는 신체장애자 등의 이용이 가능한 주차장 및 통로를 설치하여야 한다.

- 보행 거리가 짧고 자동차의 교통 동선과의 교차가 극히 적은 위치를 선정하고 필요한 표시를 하여야 한다.

- 장애자 등이 이용하는 주차의 폭원에 대해서는 통상의 폭원에 1m 이상의 여유를 더하여 설계한다.

- 장애자의 통로는 기타 보행자와의 마주침을 고려하여 1.8m정도의 폭원을 확보하고, 평면 통로로 하는 것을 원칙으로 한다.

마. 비용에 대한 고려

- 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등이 제시되어야 한다.

- 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

- 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교ㆍ검토되어야 한다.

사. 소음·진동·방진의 고려

「소음·진동관리법」 제23조, 제26조 및 제29조 등에 맞게 설계한다.

(2) 건축계획분야

가. 기본 지침

- 설계용역의 착수 시 설계자와 모든 관계자가 당해 설계용역의 목적에 대하여 분명히 인식하고 확인을 하여야 한다.

- 현장 여건을 정확히 조사한 후 배치계획은 대지의 특성과 지역ㆍ지구 요구조건, 인접 건축물, 공개 공지, 보행자와 차량의 동선 요구조건 등과 상응하여야 한다.

- 건축물 외부 설계와 재료 마감은 건축물 형태와 조화되어야 하고, 영구적이고 내구적이며 유지· 보수관리가 용이하여야 하고, 개보수 시 기존 재료와의 일치를 고려하여야 한다.

- 내부 공간계획은 이용자와 차량의 동선이 명확하여야 하며, 기능적으로 연계되고 효율적인 배치가 가능하도록 계획되어야 한다. 또한 부적절한 서비스의 배치와 같은 간섭과 잠재적 위험이 제거되어야 한다.

- 내부 마감 재료는 건물의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하고, 내구적이며 유지 보수가 용이하여야 한다.

- 각종 편의시설 및 위생시설은 사용자가 편리하고 합리적인 유지관리가 될 수 있도록 설계한다.

- 이용자 편의 증진 방안을 적극 반영하기 위해 유니버설디자인(Universal Design) 적극 반영 유도할 것

- 건물 내·외부 색상은 주변환경과 조화로운 색상계획을 수립한다.

- 층별·용도별 구분하여 공간을 최대한 활용되도록 공간 구획한다.

- 장애인이 접근이 용이한 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

- 계약당사자는 치수, 재료, 건물 구성요소의 설치와 관련하여, 현재 건설산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

나. 세부 지침

- 배치 및 동선계획

· 인접 도로에서의 효율적인 접근성 확보(차량, 보행, 주차 등)와 편의성을 확보한다.

· 기존 건축물과 유기적으로 연결될 수 있도록 합리적인 공간 이용이 가능하도록 배치한다.

· 주변 시설물과 동선이 연계되고 조화로운 경관이 형성되도록 하며, 시각적으로 차폐되지 않도록 밝은 분위기의 건축물을 계획한다.

· 부지여건을 고려한 유기적인 배치 및 일조, 채광, 배수 등을 고려한다.

· 자연에너지를 충분히 활용하여 에너지 절약계획을 반영한 건물을 배치한다.

· 기존 건축물과 이격 및 여유공간 확보, 동선체계 분리 등을 고려하여 배치한다.

· 보행자의 안전을 우선 확보하며, 보차동선의 교차는 최소화한다.

· 보행로 폭, 경사로 등은 장애인 등의 편의시설 설치기준에 적합하도록 설치한다.

· 장애인전용주차구역, 교통약자주차구역 등은 주출입구로의 접근이 용이한 위치에 설치한다.

· 화재·비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 동선 및 소방 진입용 동선 계획을 수립한다.

· 물품 반·출입, 쓰레기 처리, 서비스 및 유지관리를 위한 별도 공간 및 동선을 확보한다.

· 캠퍼스 전체 마스터플랜과 지역개방 시설의 특성을 고려한 배치계획을 할 것

-현장조사를 철저히 하고 발주처에서 제공하는 자료를 참고하여 계획해야 한다.

-지역주민 접근과 인접한 기존 시설과의 연계를 고려한 건축물의 주줄입구를 설정하고 건축물의 방향을 결정할 것

-거점형 돌봄센터와 방과 후 교실은 실내환경을 위한 남향배치를 계획할 것

· 캠퍼스 전체의 동선체계를 고려한 동선계획을 제안할 것

-대상지 북측과 남측에 주차장이 위치하므로 차량동선과 보행동선과의 교차 및 간섭을 최소화한 안전한 보행환경 구축할 것

-인접한 초등학교와의 보행 연결동선 계획할 것

-시설 이용자(교직원, 학생, 지역주민)의 다양한 교통수단(자전거, PM 등)을 고려하여 보관소 계획을 권장함

· 사업범위 자료를 참고하여 계획할 것

-본 사업에 포함하는 외부공간(녹지, 휴게공간, 주차장)은 충분한 공간을 확보하여 편의를 제공해야 한다.

-지역주민이 이용하는 시설이므로 이용자의 편의와 복지를 위한 다양한 휴게공간을 조성을 권장함

-방과후 교실 또는 거점형 늘봄센터의 프로그램과 연계된 외부 활동공간(놀이터, 소규모 체육시설)도 조성을 권장함

-내·외부 시설의 연계 방향을 제시하고 외부공간 계획의 주안점을 구체화할 것

-옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 벤치 등) 디자인의 통일성·일관성 고려할 것

· 기존 건축물과의 지상부 연결을 고려하여 계획할 것

- 외부공간계획

· 주변 가로경관과 사용자의 동선을 고려하여 경계부에 오픈 스페이스(휴게, 녹지 등) 조성한다.

· 외부공간은 시설 내부의 기능과 유기적으로 연계되도록 내·외부와의 통합적으로 계획한다.

· 주변 보도 현황 파악 및 보행자를 위한 보도 계획을 수립하여 건물 진입 공간 및 출입에 지장이 없도록 계획한다.

· 시야를 가리는 시설물 설치를 지양하고 열린 공간으로 조성, 안전에 관한 설계를 최대한 반영한다.

· 야간보행의 안전성확보 및 범죄예방설계(CPTED) 적용, 방범 시설 설치 등을 고려한다.

· 인접 시설 및 지하 공동구 등 기초간섭이나 구조안전성 등을 고려하여 시공 용이성을 확보한다.

- 평면계획

<조닝>

· 영역별(돌봄영역, 체육영역 등) 영역 분리 또는 통합이 필요한 시설을 검토하여 합리적인 공간을 계획한다.

· 공간의 특성을 고려하여 연계 및 이격하고 지원시설이 필요한 경우, 공유가 쉽도록 계획한다.

· 기능에 따른 영역을 고려하여 계획할 것(수영장, 늘봄센터, 방과후 교실, 디지털 스포츠센터 등)

-실별 요구사항 및 배치기준(연계·분리 여부)을 고려하여 실 배치대안을 제안할 것

-영역별 지역주민 개방범위, 개방시간(주·야간, 주말, 방학), 주 이용자를 제시하여 필요시 분리 운영이 가능하게 할 것

<주요 실별 고려사항>

· 수영장은 설비 및 하중을 고려한 배치계획이 필요하며 수영장 내부 환경의 쾌적성과 시공 경제성을 검토하여 적정 층고를 계획한다.

· 수영장은 동시 사용 인원 수, 준비 운동 공간, 수업·실습 공간, 이동 통로, 안전 요원대기 공간, 설비(펌프, 정수, 보충수, 발전기 등) 공간을 고려하여 계획한다.

· 수영장은 에너지 소비량이 많은 대공간이므로 에너지 절약 및 유지 관리가 용이한 경제적인 설계. 단면계획 시 자연채광과 인공조명을 함께 검토하여 실내의 균질한 조도 유지 및 사용에너지 절약방안을 유도한다.

· 각종 교육공간(늘봄센터, 방과후교실 등)은 향후 수요변화 및 운영 프로그램의 변화 시 대응을 위해 가변형 구조를 적용하여 유연성이 확보된 공간으로 조성한다.

· 또한 각실의 특성에 따른 필요 설비(음향, 조명, 프레젠테이션 관련 설비 등)를 고려하여 계획한다.

· 체육시설, 늘봄학교, 방과후 교실 등 이용자 동선이 상호 혼재되지 않도록 동선 구분을 한다.

· 각종 부속 공간(각종 수납공간, 창고 등)이 누락되지 않도록 유의한다.

· 적정한 여유공간(홀, 로비 등)을 확보하여 휴식과 만남을 위한 장소로 쾌적한 분위기의 공간으로 조성한다.

· 향후 늘어나는 수요변화에 따라 탄력적인 운영이 가능하도록 가변성 및 융통성 있는 공간 구성과 유사한 공간은 최대한 같은 존으로 계획한다.

· 에너지 절감 및 운영에 대한 경비, 관리 비용의 최소화가 가능하도록 경제적인 설계를 한다.

· 재난 발생 시 긴급 대피가 가능하도록 단순한 내·외부 동선을 수립하며, 모든 사용자가 응급상황에 즉시 인지할 수 있도록 재난 상황 고지 설비를 수립한다.

· 시설 운영계획 및 실별 연계성을 고려하여 적절한 조닝·공간·설비(보안, 조명, 냉·난방 등)계획한다.

· 이용 편의성을 종합적으로 검토하여 무장애(barrier free) 공간으로 계획한다.

· 향후 증축 대비 각종 기계관련 설비를 고려하여 계획한다.

· 각 실의 수용인원을 명시하고 이를 토대로 적정면적을 검토할 것

-수용인원 및 관련 법규에 적합한 코어 및 피난계획을 수립할 것

-늘봄학교-1, 2, 3의 각 실별 인원은 15~20명 이내로 운영 예정이므로 인원을 고려하여 계획할 것

-「2024 늘봄학교 운영 가이드라인(한국교육개발원)」을 참고하며 운영 프로그램을 설정하고, 공간구성 제안할 것-추후 협의를 통해 확정예정 임

· 설계과정에서 다음의 사항을 반영할 수 있도록 유도할 것

[수영장]

-「체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률 시행규칙」제8조[별표4] 개정된 수영장 시설기준, 안전사항 등 을 계획에 반영할 것

-가급적 자연채광을 적용하여 에너지절약을 고려하며, 균일한 실내 온습도 유지를 위한 설비계획을 수립할 것

-(샤워실, 탈의실) 남여 수용인원을 제시할 것. 노약자 및 장애인 등 신체 특성 및 활동반경을 고려하여 규모를 확보할 것

-수영장 관리감독이 용이한 위치로 코치실(안전요원실)을 계획할 것

-유아용 풀 계획 시 CCTV, 충격보호대 등 안전시설을 검토하여 계획할 것

[거점형 늘봄센터]

-이용대상(초등학생1~4년)의 접근성, 이동동선, 관리상 시야확보 등을 고려해서 저층부에 설치를 고려할 것

-학습공간, 활동공간, 사무공간, 조리공간, 기타(위생공간)등으로 구분한 「다함께돌봄센터 공간 가이드(2020 아동권리보장원)」을 참고하여 제안할 것

[방과후 교실]

-체육, 과학, 문화쉼터별 운영프로그램을 검토하고 장비는 향후 결정하며, 향후 수요 및 시설변경을 고려한 가변형 벽체로 계획할 것

-스크린스포츠와 지능형과학실에 대한 공간을 제안하고 향후 협의를 통해시설 확정, 내부마감을 구체화할 예정임

-쿠킹실은 주방시설을 배치하고 조리기구 사용에 따른 환기, 급배수시설을 설치할 것

-각 쉼터별 계획시, 장비보관창고, 기구 운영실, 등 용도에 따른 부속실을 세부화하여 제안할 수 있다

[디지털스포츠센터]

-대학교의 관련학과(체육학과 등)와 협의하여 기본설계 확정시 주요시설의 공간이 변경될 수가 있음

-각 기구별 조정, 관리, 수리실을 제안할 수 있다

-특히, 디지털 장비가 설치되는 실들은 장비 배치를 계획할 것

· 디지털스포츠센터는 시설 장비 전문가(전문업체)와의 협의를 통해 설계를 완료해야 한다.

-운영에 필요한 설비요건 및 주요 장비는 향후 자문을 통해 확정하고자 함

-업체에 따라 장비구성이 상이 할 수가 있으므로, 향후 전문업체와의 협업을 통해 시설장비 및 규모를 확정하고자 함

· 수영장 등 무주공간이 요구되는 실들에 대해서는 특수구조 적용을 검토할 것

· 인테리어가 필요한 실들은 사용자들과 협의하여 추가될 수가 있음

- 입면 및 단면계획

· 주변 건축물과 조화가 되도록 계획한다.

· 화려하고 다채로운 컬러를 지양하고 통일성이 부여된 디자인 입면을 창의적으로 구현한다.

· 자연채광·환기가 잘 돼야 하고 경제적이고 유지관리가 쉬운 재료를 적용한다.

· 건물 외부 마감재는 변형, 변색이 적고 경제적이며 내구성이 좋은 재료를 선택하고 주변 건물과 조화로운 미관을 고려하여 계획한다.

· 에너지 절약 등 차원에서 전체벽면이 유리로 된 커튼월 구조는 지양하며 창호 면적 비율은 50% 이하로 한다.

· 외벽의 차양시설을 계획한다.

- 재료 및 색상계획의 주안점

· 사용 자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고, 내구성, 내화성, 내후ㆍ내식성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감 방법을 선택한다.

· 사용 자재는 건축법 관련 규정에 적합하게 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 방염처리를 소방 관련 법령에 맞도록 설계한다.

· 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해 물질이 적은 친환경 재료를 선정하도록 한다.

· 녹색건축물 인증과 관련하여 환경친화적 제품(환경마크 인증제품) 및 우수 재활용 인증마크제품(GR마크 인증제품)을 우선적으로 사용하여야 한다.

· 로비, 홀 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜되며 미끄럼을 방지할 수  있는 재료를 선정한다.

- 기타계획

· 지역의 특성과 용도의 특성에 적합할 수 있도록 공공디자인의 요소를 반영한다.

· 건축물의 MASS, 색상, 자료 등은 기존 시설과의 조화를 고려한다.

· 주출입구, 로비, 주요 공용공간, 건물명 사인 계획 요소를 연출하고, 필요하다고 판단되는 부분을 제시한다.

아. 구조 계획

1) ｢건축법｣, ｢건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙｣, ｢건축물의 하중기준｣ 및 최신의 구조설계기준, 내진설계기준 등에 적합하게 하여야 한다.

2) 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여

그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 함

3) 제반 하중 하에서 구조물에 유해한 영향이 미치지 않도록 설계하여야 함

4) 구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 구조계획 및

설계상 배려하여 계획하여야 함

5) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여야 함

6) 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 함

7) 구조의 안전성능은 법령 및 정부, 학회, 국토교통부 산하 연구소 및 기관 등에서 정한 설계기준을 준수하여야 함

8) 진동 및 소음에 대한 안정성을 확보하여야 함

9) 기존 본관시설과 연결하여 증축 시 시행한 지반조사 및 구조계산 결과를 바탕으로

기초 및 구조양식을 결정하여야 함

10) 수영장은 무주공간을 지향하며 구조적 안정성 확보와 유지관리 용이 및 시공비 증가가 되지 않는 구조 계획하여야 함

11) 수영장의 벽체와 바닥은 수압과 외부 압력을 견딜수 있는 기준 준수 및 내구성 확보 설계하여야 함

12) 수영장은 습기와 화학물질(염소 등)에 강한 자재를 사용 설계 계획하여야 함

13) 습기와 누수를 차단할 수 있는 구조설계 계획하여야 함

14) 건축구조의 안전성 및 경제성과 관련하여 다음 사항을 검토･반영한다.

가) 각 실의 기능 및 부대설비에 적정한 층높이 결정

(1) 냉난방 열손실, 층높이에 따른 시설투자비, 보 단면 설계방법 등 검토

나) 구조에 있어 경제적이고 시공이 용이한 구조를 선택하여야 한다.

(2) 구조상 불필요한 부분의 삭제 및 부재단면 적정여부 검토

(3) 시공 및 구조계산법이 용이한 구조계획

(4) 구조의 안전에 필요한 부재의 최소 단면 결정

다) 지반상황에 적합한 기초구조를 선택 및 설계하여야 한다.

(1) 적정한 지내력 확보

(2)  기초의 구조 및 시공방법의 결정

15) 실 전체의 하중이 증가될 것으로 예상되는 실은 구조안전을 확인하여야 하며 필요

시 보강계획을 설계에 반영하여야 함

16) 무주공간으로 계획할 경우 지붕구조형식 및 지붕재료에 대해 종합적으로 검토하       여 계획한다.

(2) 공간별 디자인 계획의 세부 고려사항

가. 일반사항

1) 설계도는 각 분야별 법규 및 규정, 기준에 적합하도록 구분설계 하여야 함

2) 인테리어 설계 시에는 준공에 지장이 없도록 설계를 진행하며, 구조·설비·소방

분야의 기존 준공 도서 변경 없도록 설계 시 고려하여야 함

3) 유사시설을 조사하여 인테리어, 디자인 우수사례를 발굴하여 제시하여야 함

4) 실시설계는 건축・소방・통신 등 분야별 기술적 상호 보완 및 연계되어야

하며, 기타 구조물・설비 등 시설물과 호환되어야 함

나. 세부지침

1) “실시설계”라 함은 기본설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도

서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을

결정하여 설계도서를 작성하며, 이 도서는 실시설계 완료 전에 각종 협의 등의 행

정절차를 거쳐 확정한다. 기본설계를 근거로 실시설계에서는 설계기준 및 각종조

건을 분석하고 이를 구체화하여 공사시공에 필요한 시방 및 규격서, 공사비 내역

서, 실시설계도서 작성 등의 세부 실시계획을 수행하여야 함

2) 실시설계도서의 작성 지침

- 설계도서는 전문(공종)분야별(건축, 토목, 기계, 통신, 소방, 인테리어 등) 설계도서

로 구분 작성한 후 납품하여야 함

- 설계도면과 도면 기호는 이해가 쉽도록 작성하며 A3크기로 설계함을 원칙으로 함

- 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성함

- 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정 여부를 확인한 후    서명 또는 날인하여야 함

- 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 설계방법, 마감 재료의 종류 및 유형, 주요 설계

조건, 시공시 유의사항 및 특기사항 등을 한글로 기록하여야 함

- 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호    및 도면 명을 표기하여야 함

- 각 설계도는 더 이상 세부설계가 없이 시공이 될 수 있도록 최대한 상세히 표현    되도록 하고 각 실의 실내디자인은 그 시설내용과 함께 미적 감각을 도입하여    설계하고, 더이상의 실내디자인의 검토가 되지 않도록 구체적인 재료와 특성이    표시된 도서를 작성하여 설계하여야 함

- 각 설계도는 관련 법규를 참조하여 분야별로 구분 설계하여야 하며 각 분야별 법규 및 규정, 기준에 적합하여야 함

- 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 저장매체(USB)에 제출함

3) 공사시방서

- 시방서는 일반사항 및 특기시방 등 도면에 의한 시공, 시방사항을 상세하게 작성해야 하며 공사시방서 작성 시는 별도의 공사시방서 작성요령에 의거 작성하여야 함

- 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 하며 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성하여야 함

- 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정하여야 함

- 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성하여야 함

- 현실적으로 인테리어 시공이 가능한 방법 및 내용으로 작성하여야 함

- 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 하여야 함

- 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성하여야 함

- 본 용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖는 것이어야 함

4) 수량산출조서, 공사비내역서, 일위대가표

- 수량산출조서는 적산기준에 의하여 산출하고, 쉽게 알아볼 수 있도록 상세하고 체계적으로 정확히 작성하여야 함

- 공사비내역서 및 일위대가표는 건설표준품셈에 의하고 자재 단가는 국내에서 공인받은 물가조사 기관의 월보에 의하되 특수한 것은 2인 이상의 견적서를 첨부 후 최소금액으로 하고, 노임은 건설업 임금 실태 조사보고서(대한건설협회)를 기준하여 작성하여야함

- 노임기준은 당해 연도 공사노임단가(대한건설협회)를 기준으로 하여야 함

- 재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보 자료를 참조 하여 최저가격을 적용하여야 함

- 품셈은 당해 연도 건설공사 표준품셈에 준하여야 함

- 조사, 공표가격이 없는 경우 공사비 산출을 위한 견적서는 2개 업체 이상의 것을 기준으로 당해 물품의 거래가격 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용하여야 함

- 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격작성 준칙에 의거 작성하여야 함

- 내역서 비고란에는 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록하여야 함

- 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수

있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건을 감안하여야 함

- 수량 산출은 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하여야 함

5) 공사 공정표

- 각 공종별로 단일화해야 하며, 이 공종들의 상관관계를 경로와 날짜가 나타 나도록 공정표를 작성하여야 함 (공정을 월별, 누계치를 표시)

- 특수공정은 작업의 시작과 종료 시점에서 선행되어야 하는 작업명칭을 기입 하여야 함

- 총 공정 일정은 실제 공사시행에 적용할 수 있는 자연적, 지리적, 인위적 요소가 반영된 일정이어야 하며, 휴일을 고려하여 산정하여야 함

(3) 토  목

가. 일반사항

1) 설계도서는 본 과업지시서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 대지현황을 인근의

지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고, 설계에 필요한 자료를

제공하여야 함

2) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선,

기타 지상 및 지하 구조물, 지하 매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석

하여야 함

3) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획

평면도는 세분하여 작성하여야 함

나. 토공 및 흙막이 설계

1) 토공은 가급적 절토, 성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고

부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록

계획하여야 함

2) 과업수행자는 토공설계시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 설계시

운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 함

※ 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치의 검토를 충분히 하여 경제적인 설계 및 대안을 수립하여 설계하여야 함

- 건설기계 선정시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비 주행성을 확보토록 함

- 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계시, 지질에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 함

- 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지질 또는 학회 발표자료 등 객관적 근거를 기초로 작성하여야 함

- 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대해서는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 함

- 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주자와 협의하여 결정하여야 함

다. 우․오수 설계

1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배출될 수 있도록 하수도

시설기준에 적합하도록 설계하여야 함

2) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의

용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 함

3) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소

관경이 150㎜ 이상이 되도록 함

4) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여

낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 함

5) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로

하며 적당한 간격으로 설치하여야 함

6) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 함

7) 기존 오수관로는 가암펌프장을 통해 최종 지자체 오수관로로 유입되는바, 오수가압펌프의 제원 등을 검토하여 용량 초과시 가압 펌프 계획을 추가하여야 하며, 처리가능용량 및 제반사항 등을 고려하여 오수처리가 원활하도록 설계하여야 함

라. 도로 및 포장 설계

1) 사업부지내 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며, 주변

도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려한 합리적인 보행자

동선을 배치하여야 하며, 필요시 투수성 바닥재료를 사용하여야 함

2) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 함

3) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을

결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 함

4) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어

우천시 우수의 흐름이 원활히 하여야 함

마. 상수도

1) 상수도는 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영하여야 함

2) 상수도는 건물과 연계하여 설계하여야 함 (공사로 인해 기존건물 사용에 지장이

없도록 설계)

바. 기  타

1) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 함

2) 일반적인 현장 내의 비탈면의 구배는 1:1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장

여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)

에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 하며, 옹벽설치가

예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부

하여야 함

3) 부지는 침수되지 않도록 적정 기울기 및 배수로를 설치하여야 함

4) 지표바닥은 친환경 재료로 마감처리 하여야 함

5) 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해 배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사, 분석하여야 한다.

(4) 조경

가. 일반사항

1) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지 환경이 되도록 하고 건물, 주차장 등

과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획하여야 함

2) 조경계획은 대지주변 경관 및 건축물의 특성을 감안하여야 함

3) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용 공간 등을 종합적으로 고려하여 계획

하여야 함

4) 조경은 자연지형을 이용하여 계획하여야 하며, 가능한 기존 수목을 이용하도록

하여야 함

5) 기존 북서측에 위치한 수목은 보호하고 이격하여 건축물을 배치할 것

나. 조경수목

1) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 함

2) 기존의 토사 또는 수종이 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 조경수 식재

구역의 토사를 치환하거나 또는 수종을 변경하는 내용을 설계에 반영하여야 함

3) 단지 내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되,

주변과 조화를 이루도록 설계하여야 함

4) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 충분한 이격거리를

확보하여야 함

5) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 함

다. 배식계획

1) 수목의 배치는 인접대지 및 내부공간 기능에 적합하도록 배치하여야 함

2) 배식은 교목, 소교목, 관목, 초화류를 수목생리와 미적인 면을 고려하여 조화롭게

구성하고 사계절을 느낄 수 있도록 계획하여야 함

3) 수종선정은 부지 내·외의 조건(환경, 수목생리, 녹지기능, 향토수종, 상징수목, 관련법규 등)에 적합한 수종으로 하여야 함

4) 잔디면적 : 수목식재 면적을 제외한 정확한 녹지구적을 통해 면적을 산출하여야 함

라. 조경시설물

1) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며, 공해, 습기, 광선 등에

견디고 구조 안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야

하며 유지관리 및 보수에 용이하여야 함

2) 산책로 또는 조경 포장이 있는 경우에는 환경친화적인 자연 재료(흙, 나무, 돌)등

주변과 조화를 이루는 자재를 사용하여야 함

3) 벤치, 등의자 등 시설물은 근무자 및 방문객 등이 이용할 수 있도록 합리적인 위치

에 배치하여 이용률을 극대화할 수 있도록 고려되어야 함

4) 필요에 의하여 옥상 정원 조경이나 실내 조경을 하는 경우에는 수목의 생육에

필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의

하중에 의한 구조 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적

으로 고려하여야 함

(5) 기계설비

가. 기계설비 일반사항

1) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 기타 조건에

적합하게 설계하여야 함

2) 기본조사(급수, 가스, 오폐수 처리시설 등)를 하여 설계에 반영하여야 함

3) 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템

을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 수요기관 및 발주자의 의견을

수렴하여 설계를 진행하여야 함

4) 보수, 유지관리가 용이하여야 하며 장래 증설이나 변경․개보수에 대한 적응성이

있어야 하며, 자동제어, 단순 모듈화 등 다양한 방법을 통하여 업무효율 극대화 및

인력절감을 기하여야 함

나. 기계설비 일반내용

1) 위생설비

- 급수방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영하여야 함

- 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 함

- 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등으로 공급하여야 함

- 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 함

- 위생기구는 K.S. 제품 또는 동등 이상품을 사용하여야 함

2) 소화설비

- 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 안전관리법 등의 설치 기준에 부합하도록 설계하여야 함

- 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계하도록 함

- 각 설비는 중앙 감시실에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 함

- 재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한 기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 검토하여 배관 설비를 계획하여야 함

- 배연설비 등은 환기설비를 최대한 활용하여 구성하여야 함

- 화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를 설치하여야 함

- 피난기구는 건축 평면계획 및 피난동선 등을 고려하여 설치하여야 함

3) 자동제어설비

- 자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 설계함을 원칙으로 하여야 함

4) 냉․난방

- 건축물 규모, 용도에 맞는 냉․난방설비 방식을 선택 설계하되 화장실 및 샤워실 등의 온수 공급은 투자비, 수익성, 사후관리 등 실제 데이터를 분석하여 결정하여 설계에 반영하여야 함

- 각 실별 부하조건 및 에너지절약형 냉·난방방식 검토 후 설계하여야 함

- 기계실 장비 및 기기의 적정배치를 고려하여 설계하여야 함

- 냉․난방시설은 각 층 및 각 실에서 제어 및 조절이 가능하도록 설치하고 온수는 전층이 공용으로 사용되도록 설치하여야 함

- 난방과 생활 온수탱크는 각각 설치하여야 함

- 냉․난방시설 설치 : 난방은 실의 크기에 따른 적정용량의 냉․난방기 (천장 매립형 절전형 냉․난방기)를 각각 설치하여야 함

5) 수 도

- 건물 전면 공간에 지상식 소화전을 설치하여야 함

- 일반적으로 사용하는 건물 내 급수시설은 계량기를 통하여 사용하도록 하여야 함

6) 급·배수 설비 및 위생설비

- 건축물 용도에 맞는 배수관 구배 및 재질 선택하여 반영하여야 함

- 위생도기는 절수형 선정 및 전자감응식 소변기, 어린이용 대·소변기 등을 반영하여 설계하여야 함

- 급수 공급 방식에서 수압 및 각 실별 관말 수압에 대한 충분한 검토와 오·배수 설비(배수구와 연결문제) 검토 후 설계하여야 함

- 재질, 규격 선정시 부식, 수두를 감안하여 설계하여야 함

- 전기실, 변전실 등을 통과하지 않도록 배관경로를 검토하여 설계하여야 함

7) 환기설비

- 실별 환기방법을 검토하여 설계하여야 함

다. 공기조화 및 냉,난방설비 및 기타

1) 공조 및 냉,난방 설비는 건축물 내 각 실별 조화가 될 수 있도록 계획되어야 하며,

경제성이 있도록 하여야 함

2) 공조 및 냉난방 방식은 에너지 절약적이고 운영에 경제성이 있어야 하며, 관리의

용이함 등을 고려하고 필요에 따라 폐냉, 폐열을 적극적으로 활용하여야 함

3) 열원기기는 부분 부하 운전 및 전 부하 운전효율이 좋은 것을 선정하고 보일러,

냉동기, 송풍기 등은 부하 조건에 따라 최고의 성적계수를 유지할 수 있도록 대수

분할 또는 비례 제어하도록 고려하여야 함

4) 기계 환기로 인한 동력 소모를 줄일 수 있도록 자연 환기를 적극 활용하여야 함

5) 수영장 품질 및 기준에 맞는 수질정화시스템(필터,오존살균,염소처리 등)설계

6) 수영장 급·배수 시스템 최적화 및 배수구 안전 설계

7) 풀 내 적정 수온유지 시스템 에너지 절약형 설계

라. 관련 제법규의 규정준수

- 건축법, 동법 시행령 및 시행규칙, 건축물의 설비 기준 등에 관한 규칙

- 소방법, 동법 시행령 및 시행규칙, 소방 기술 기준에 관한 규칙

- 에너지 이용 합리화법, 동법 시행령 및 시행규칙, 열 사용 기자재관리 규칙

- 폐기물 관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

- 오수.분뇨 및 축산 폐수의 처리에 관한 법률, 동법 시행령 및 시행규칙

- 에너지 절약 설계 기준등, 에너지 합리적 이용기준

- 수도법, 동법 시행령, 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙

- 승강기제조 및 관리에 관한 법률

- 기타 관련 법령·법규 및 규칙

(6) 소방설비

가. 소방설비 일반사항

1) 건축물의 안정성 확보 및 건물 내부의 인명에 대한 안전에 중점을 두고 설계

하여야 함

2) 화재의 수평, 수직의 확산을 방지하기 위하여 마감재료의 불연화 및 방화구획 등을

검토하여야 함

3) 화재감지 경보시설의 철저로 화재의 조기발견, 자동제어 등에 차질이 없도록 함

4) 피난에 따른 동선계획을 수립하여야 하며, 유사시 신속한 대응을 위한 감시 기능의

확립과 비상시에 신속한 피난유도가 가능하여야 함

5) 피난유도설비는 비상시 유효작동 여부, 사용법 명시, 성능 유지관리, 피난유도의

조직화 등 관리면에서 효율화를 기하여야 함

나. 소방설비

1) 소방법규 및 각 시설물의 용도에 적합한 소방설비를 검토하여야 함

2) 소방기계 설비는 소화설비, 옥․내외 소화전 설비, 물분무 소화설비, 포소화 설비,

스프링클러 설비, 연결송수관 설비, 연결살수 설비, 연소방지 설비,

피난설비, 피난기구, 소화수 탱크 설비, 기타 필요한 설비 등 관련법 및 관련화재

안전기준에 적합토록 하여야 함

3) 소방전기 설비는 비상전원 및 배선, 자동화재탐지설비, 비상경보설비 및 비상방송

설비, 유도등, 기타 필요한 설비 등 관련법 및 관련 화재안전기준에 적합하도록

하여야 함

다. 기타 설비

1) 건축계획 및 기능에 적합한 소방설비 설치를 검토하고 설계에 반영하여야 함

(7) 정보통신

가. 일반사항

1) 각 실별 수요를 반영한 미래지향적이며 충분한 용량을 확보하여야 함

2) 설계시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 함

3) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록하고 방범 및

보안·관리가 용이한 구조로 설계하여야 함

4) 건물 옥탑에는 피뢰시설 설치하여 건물이 보호될 수 있도록 하여야 함

5) 구내 랜케이블은 모두 Cat 6 규격 이상으로 설치하여야 함

6) 정보통신 및 전파관련 법규 등 제 규정과 지침을 반드시 반영하되, 유·무선 인터넷

및 통신케이블, 전화 등을 충분한 소요량 이상으로 반영하여 설계하여야 함

7) 정보통신설비 설계는 TTA표준(한국정보통신기술협회), KICI(한국 정보통신산업

연구원)기준을 준용하여야 함

8) 통합배선반과 구내통신 선로설비(배관 및 케이블 루트, 접속점 등)들은 수용변경에

따라 상시 현행화가 될수 있도록 운용․관리 스마트화 방안을 제시하여야 함

나. 정보통신 일반내용

1) 통합배선설비공사

- 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 함

- 통신실의 설치조건 및 위치를 검토하여야 함

- 통합배선 구성방식 및 전화/LAN 수구/ WIFI설비 적정수량을 검토하여야 함

- MDF/IDF 위치 규모 및 접지를 검토하여야 함

- 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 함

- 유지보수가 용이하도록 설계하여야 함

2) 약전설비공사

- 방송설비, A/V설비를 검토하여야 함

- MATV설비, CATV설비를 검토하여야 함

- OA기기, 집무형태의 변화 등 모든 상황에 대응하는 Flexibility한 System을 구성

하여야 함

3) 통합접지공사

- 피뢰침 및 접지규모를 검토하여야 함

- 피뢰침의 보호각을 검토하여야 함

- 규정 및 기준에 적합한 통신접지공사가 되도록 설계하여야 함

4) 기타설비

- 기타 특수설비(CCTV, 출입통제, 장애인화장실 비상벨 등)에 따른 적정설비설계가 되도록한다(발주기관과상의 후 시행)

(8) 신·재생 에너지설비

가. 일반 사항

1) 현지조사를 실시하여 신·재생 에너지 설비를 비교·검토하여 경제적이고 활용성이

극대화될 수 있는 방식을 설계하여야 함

2) 에너지 사용이 최소화 할 수 있도록 기계설비·전기분야와 협의하여야 함

3) 신·재생 에너지 설비 방식에 대하여는 별도 보고하여야 함

4) 신·재생 에너지 관련 법령에 적합하도록 설계하여야 함

5) 신·재생 에너지 사용에 대하여 설비 설치계획서를 작성하여 한국에너지공단 신·

재생 에너지센터에 제출/검토 승인을 받아 실시설계에 반영하여야 하며, 검토

결과서를 첨부하여 제출하여야 함

(9) 설계단계별 BIM 적용 지침 (발주처 협의 후 필요시 진행)

가. 본 사업의 “설계단계별 BIM 적용 지침”은 BIM 적용지침을 준용한다.

나. 설계자는 BIM 적용지침에서 요구하는 BIM 업무를 효과적으로 수행하기 위한 조직을 구성하고 업무환경을 구축하여야 한다.

다. 설계자는 BIM 업무 효율성을 위하여 발주기관(본 사업의 수요기관 및 조달청)의 사전 승인을 득하고 BIM 컨설팅 및 기술자문을 받을 수 있으나, 자체적인 BIM 업무수행 능력을 확보하여야 한다.

라. 설계자는 계획·중간·실시설계단계에서 다음과 같이 BIM 업무를 수행한다.

1) 설계자는 과업내용서 상 “설계단계별 BIM 적용 지침”의 내용 및 “부속서-3 BIM 업무수행계획서 표준 템플릿”을 준용하여 BIM 업무수행계획을 수립하고, “BIM 업무수행계획서”를 발주기관에 제출한다. 제출한 “BIM 업무수행계획서”에 대하여 발주기관으로부터 수정 및 보완지시가 있는 경우에는 그에 따른다.

2) 설계자는 “설계단계별 BIM 적용 지침” 및 “BIM 업무수행계획서”의 내용에 따라 BIM 업무를 수행한다.

3) 설계자는 품질체크가 완료된 BIM 성과품을 “BIM 결과보고서”와 함께 발주기관에 제출한다.

마. 본 사업의 BIM 적용은 모든 설계건물을 대상으로 한다.

바. 본 사업의 BIM 데이터 부재 작성 범위는 다음과 같다.

1) (계획설계단계) 건축, 구조, 토목 분야를 최소 대상으로 한다. 각 분야별 BIM 데이터 작성 범위는 BIM 적용지침의 “최소 부위 작성대상” 내용 이상으로 한다.

2) (중간설계단계) 건축, 구조, 기계, 토목 분야를 최소 대상으로 한다. 각 분야별 BIM 데이터 작성 범위는 BIM 적용지침의 “최소 부위 작성대상” 내용 이상으로 한다.

3) (실시설계단계) 건축, 구조, 기계, 토목, 조경(선택) 분야를 최소 대상으로 한다. 각 분야별 BIM 데이터 작성 범위는 BIM 적용지침의 “최소 부위 작성대상” 내용 이상으로 한다.

사. 본 사업의 설계단계별 BIM 활용기준 및 활용수준은 BIM 적용지침서를 준용한다.

활용기준		활용수준	계획설계	중간설계	실시설계
디자인 검토	투시도 및 조감도 활용	- 건물 외관 디자인 검토 - 건물 주요 내부 디자인 검토	필수	필수	필수
	동영상 제작
	설계안 검토
BIM 설계도면 산출		- 정확한 설계도면 산출	필수	필수	필수
수량 기초데이터 산출		- 견적을 위한 수량 기초데이터 산출	필수	필수	필수
환경 시뮬레이션	에너지 검토	(BIM 적용지침에서 정한 세부 분류에 따름)	선택	선택	선택
	빛환경 검토	(BIM 적용지침에서 정한 세부 분류에 따름)	필수	필수	필수

아. BIM 설계대가의 산정은 국토교통부 고시「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」제18조에 따라 실비정액가산방식으로 한다. 다만 설계용역 발주 단계에서 확정된 BIM 설계대가 범위 내에서 사후 정산한다. 따라서 설계자는 BIM 적용에 따른 비용(BIM 설계대가 사후정산서 첨부)을 최종 설계 납품 단계에서 발주기관에 제출한다.

자. 세부적인 BIM 적용 방법은 설계자 선정 이후 발주기관과의 협의에 의하여 정한다.

설계별 설계도서

1. 계획설계

(1) 정의

“계획설계”라 함은 발주자로부터 제공된 자료와 현장조사 및 자료 수집내용을 근거로

건축물의 규모, 예산, 기능, 품질, 미관적 측면에서 설계 목표를 정하고 실현 가능한

해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 토목,

조경 등을 말한다.)의 기본시스템을 검토하여 발주기관의 요구조건을 반영한 계획(안)을

발주자에게 제안하여 승인을 받는 설계단계를 말함

(2) 일반 사항

설계자는 대지의 주변상황을 참고로 하여 전체 부지의 효율적인 활용계획을 먼저

수립한 뒤 발주자의 승인을 받은 후 기본설계를 진행하여야 함

설계자는 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획설계를 진행함

설계자가 제출한 계획안이 부적합하다고 발주자가 검토 의견을 통보 시 설계자는

조속한 시일 안에 새로운 대안을 재 작성하여 제출하여야 함

발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완․제출하여 발주자의

승인을 득한 후 기본설계를 진행하여야 함

(3) 계획(안) 작성 시 포함사항

가. 설계설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요, 동선

계획, 우․오수계획 등〕

나. 주변 도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합 배치계획(Masterplan)

다. 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

라. 우․오수처리계획

건물 개략 평면 및 입면계획

건물 입면형태 및 주변과의 조화

조경계획

개략공사비 산정

기타 필요한 사항 및 발주자 요구사항(기존 유사건물 조사분석자료 등)

(4) 현장 조사방법

현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 함

가. 문헌 및 서류조사

기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는

모든 사항에 대하여 조사하여야 함

해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부

등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사하여야 함

나. 현장조사

1) 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지내 경작물, 소음․진동,

주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장

조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 함

2) 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 함

대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등

모든 요인을 조사하여야 함

가스, 상․하수도, 오폐수처리방법, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반

시설에 관한 일체의 사항을 조사하여야 함

현장의 대지 내 주위 경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록

하여야 함

다. 조사된 결과는 기본설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에

첨부하여야 함

(5) 측량조사 방법

가. 일반사항

1) 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을

정하여 설계의 신뢰성을 확보하여야 함

2) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독관과

협의 후 현지측량에 임해야 함

3) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타

관련규정에 따라 시행하여야 함

4) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사

사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시하여야 함

5) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준

으로 과업수행 실적에 부합되게 정산하여야 함

인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 설계자가

책임지며, 설계자 부담으로 이를 해결하여야 함

조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 설계자는 이를 설계자 부담으로 보완하여야

하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완 및 수정 또는 전면

재검토하여야 함

지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되, 도곽선

및 도근점을 아울러 등사하여야 함

현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10% 이상 여유있게

측량하여야 함

나. 조사측량

1) 현황측량(평판측량)은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과

부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 함

- 축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 과업면적의 10% 이상 여유로 측량하여야 함

2) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주기관과

협의 후 결정하여야 함

3) 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능

하게 설치하여야 함

4) 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출하여야 함

5) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 함

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용하여야 함

- 각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 함

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시하여야 함

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입하여야 함

6) 각종조사 및 계산

- 지적의 복제

• 기 조사된 지적도와 현황측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입 하여야 함

• 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의하여 실시하여야 함

다. 표시항목

1) 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하 지장물,

주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든사항을 표기하여야 함

라. 기타사항

1) 본 지침서에 명기되지 않았으나 설계자가 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사

사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시하여야 함

2) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산함

3) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 설계자가

책임지며, 설계자 부담으로 이를 해결하여야 함

4) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 설계자는 이를 설계자 부담으로 보완하여야 하며,

조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독관의 요구에 따라 이를 보완, 수정

또는 전면 재검토하여야 함

2. 중간설계

(1) 정의

“중간설계”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받는 설계단계를 말함

(2) 일반사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라 작성

하여야 함

2) 계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시함

3) 설계설명서 : 위치도(접근성 명시), 조감도, 층별 평면도, 실별 면적현황, 주요기기

및 기구배치 계획, 공사추진 일정표등을 제시하여야 함

4) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 함

5) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을

제시하여야 함

6) 기계설비, 소방, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산 등

구조계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부함

7) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 음향실 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주

기관의 승인을 받아야 함

(3) 설계서 구성

가. 건축

1) 설계설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패사례를 조사․분석․검토 내용(반영사항 표기)

- 계획설계내용

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 시공방법 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

- 개략공사비 산정 : 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비 관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요자재계획 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

- 기타 필요한 사항

2) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

3) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

4) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속 시설의 위치, 기타 시공에 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

나. 토목

1) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

※ 지반고는 반드시 측량을 실시하고 공사 착공시 인위적인 지반고 변경이 없음 에도 도면과 상이시는 설계자 부담으로 재 측량하여야 함

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

2) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

- 절(터파기)․성토 사면안정성검토서

3) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른

결과물

4) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

5) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

다. 조경

1) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

2) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거

3) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 조형물, Pergola, Bench, 음수대, 휴지통, 안내판 등 조경시설물

라. 기계설비

1) 설계 설명서

- 설비 대략 공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

2) 시 방 서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항 (발주기관의

지침에 따라 작성)

3) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

4) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마. 소방설비

1) 설계 설명서

- 소방설비별 개요와 장비의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

- 개략공사비 산정

2) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거

3) 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명하여야

함 단,K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있음

4) 도면종류

- 소방설비 주요부분 평면도, 단면도

- 범례 및 도면목록

- 각종 기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면 (소방기구 및 배관 전체배치도), 소방장비 배치도

- 계통도 : 배관 및 소방기구 등 기타 세부계통도

- 평면도 : 각종 소방 평면도, 소방장비 상세도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 맨홀 도면

- 기타 필요한 도면

바. 정보통신

1) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

- 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함함

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

2) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

3) 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명하여야

함. 단,K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있음

4) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타통신 설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요설비의 배치도

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

사. 신·재생 에너지설비

1) 설계 설명서

- 신재생에너지 시스템 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지 관리비와의 세부비교 검토내용 등

- 개략공사비 산정

2) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거

3) 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명하여야

함. 단,K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있음

4) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례 : 사용될 기호

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서, 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(신·재생 에너지 배치도), 기계실 장비배치도

- 계통도 : 옥외 및 내부 간선 세부계통도

- 평면도 : 각종 장비 설치평면도, 기계실 확대평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

3. 실시설계

(1) 정의

“실시설계”라 함은 기본설계(계획+중간설계)를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에

필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감,

색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로

납품하는 설계의 최종단계를 말함

(2) 일반 사항

1) 기본설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라 작성함

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록하여야 함

3) 설계도서 작성 기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정

하여야 함

4) 전기, 기계설비, 통신, 소방 및 주요 장비의 용량 산출과 구조물의 구조계산 등

계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부하여야 함

(3) 설계서 구성

가. 건축

1) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부 시공방법

- 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

2) 구조 계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

3) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

- 당해 공사의 시방서에는 건축물의 내진능력을 산출하여 준공표지판에 공개 하도록 필히 기술

4) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도, 단위 평면도

- 각층 천장 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보 위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판류 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

5) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

나. 토목

1) 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

2) 구조 및 수리계산서

3) 지질조사보고서 : 표층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계

내용에 반영

4) 시방서

5) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

6) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

다. 조경

1) 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

2) 시방서

3) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

라. 기계설비

1) 설계 설명서

- 냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

2) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

3) 설계 계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서(위생, 오․

배수, 가스배관), 공조장비 선정서(습공기선도에 공기상태 표기), 필요시 견적서 등

4) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 공조, 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체(엘리베이터 건축단면도 포함)

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

마. 소방설비

1) 설계 설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화, 경보, 피난설비 등)에 대한 설명, 세부 비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주 수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

2) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명 하여야 함. 단, K.S. 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있음

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기하여야 함. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있음

3) 설계계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 소화수원량 산출서

- 그 외 장비 용량계산서, 필요시 견적서 등

4) 도면종류

- 도면 목록표, 현장안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 전체배치도(소방기구 및 배관, 소방장비 배치도)

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종 기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 배관 및 소방기구 등 기타 세부계통도

- 각종 설비의 평면도 : 각종 소방 평면도, 소방장비 상세도

- 각종 설비의 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

바. 정보통신

1) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함함

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

2) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

3) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명함. 단, K.S.등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있음

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의 사항등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수있음

4) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타 설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격

조사자료 등

사. 신·재생에너지

1) 설계 설명서

- 신재생에너지 시스템 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용 등

2) 시방서

- 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

3) 설계계산서

- 부하계산서, 장비 용량계산서, 필요시 견적서 등

4) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표

- 배치도 : 옥외평면(신·재생에너지 배치도), 기계실 장비배치도

- 계통도 : 옥외 및 내부 간선 세부계통도

- 평면도 : 각종 장비 설치평면도, 기계실 확대평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서

- 수량산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

4. 성과품 작성

(1) 일반사항

가. 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표2] 건축설계에서의 도서

작성을 기준으로 하여 계획설계, 중간설계, 실시설계의 도서내용 중 도서작성 구분

‘중급’에 해당하는 도서를 작성하여야 하며, 아래 각각의 설계단계별 납품도서에

도서 작성내용이 첨부될 수 있도록 하고, 불가피하게 첨부할 수 없을 경우 별도의

도서로 납품할 수 있음

나. 기타 발주기관이 요구하는 사항에 대하여는 자료를 추가 작성하여 제출하여야 함

(2) 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안) 3개	A3	4	부	스케치 OR 스터디 모형
2	현장조사보고서	A4	4	부	유사시설 견학보고서 포함
3	현황측량보고서		4	부	현황측량 성과도
4	분야별 계획서	A4	4	부
5	관련법규 검토서	A4	4	부	건축물 건립에 따른 관계법령 전반 용역 착수 후 1개월 이내 제출
6	공사비 검토서	A4	4	부	시설비 예산에 대한 개략공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 위 제출목록 전부를 USB로도 제작하여 제출하여야 함

※ 설계공모 심사위원 지적사항 및 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 포함하여야 함

(3) 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종						비 고
					건축	토목	조경	기계	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략공사비
4	계 산 서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방 포함
6	지질조사보고서	A4	5	부		◯
7	에너지절약계획서 관련 검토서	A4	4	부	◯			◯	◯	◯
8	조감도	A1	3	부	◯

1) 발주기관과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있음

2) 중간설계보고서 포함사항(공사개요, 사전조사내용, 분야별 설계설명서, 추정공사비,

법규검토, 교통동선 분석, 향후 실시설계 방향 등)

3) 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본하여야 함

4) 토목, 조경, 기계, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본하여야 함

5) 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출하여야 함

6) 구조설계 등에 필요한 지질조사보고서는 발주처가 제공한 자료를 활용하거나, 소요되는 비용을 발주처에서 요구할 수 있음

(4) 실시설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종												비 고
					건축		토목		조경		기계		통신		소방
1	종합보고서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		1부로 작성
2	설계설명서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
3	원도	A1	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		발주기관 요구시
4	설계도면	A1	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		반접이
		A3	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		반접이
5	계산서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
6	내역서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
7	관급내역서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
8	수량산출서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
9	단가산출서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		견적서 포함
10	일위대가표	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
11	일반시방서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
12	특기시방서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
13	관급시방서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
14	조감도		3	부													중간설계 제출안 최종수정
15	공정표		1	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		전 공종 포함, 근거자료 제시
16	USB		7	SET	◯		◯		◯		◯		◯		◯		계획/중간/실시/각종심의/인허가관련문서/회의록/각종발표 자료 등 포함
17	에너지 절약계획서 관련 증빙서류
18	설계안정성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항, 설계안전보건대장
19	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel, xml), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등															공사개요, 현장설명서 포함
20	자재 견본 자료	A4	2	SET	◯	◯		◯		◯				◯		◯	제품명, 색상, 규격 등 포함, 자재 선정 사유(견적가격 포함 가격 비교 2개 이상)
21	기타 발주기관 요구사항				◯	◯		◯		◯				◯		◯	경제성검토, 설계적정성 검토 등

1) 조감도는 제출 시 별도로 A1 규격(표구 1개포함) 3매와 원본File을 USB로 제출

하여야 함

2) 종합보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정,

참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정 ․ 보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에

대한 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서 작성협조, 납품설계도

서 목록 등일체 기재하여 A4규격의 책자로 양면 인쇄하고 무선무사철로 좌철

하여야 함

3) 설계도면파일은 CAD 제작 후 USB에 저장하여 제출하여야 함

4) 설명서, 공사시방서 등을 워드프로세서 작업 후 USB에 저장하여 제출하여야 함

5) 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함)은 EMS 프로그램 등 상용프로그램으로 사용

하되 EXCEL 프로그램으로 변환하여 작성 제출하여야 함

6) 공사예정공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 공사량에 맞게 정확

하게 작성․제출하여야 함

7) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출하여야 함

8) 필요시 공사별 현장설명서(A4)는 발주기관 요구 부수를 작성 제출하여야 함

9) 납품수량 등은 발주기관 필요시 추가납품을 요구할 수 있으며, 기타 자세한 사항은

발주기관과 별도 협의하여야 함

□ 년차별 과업 기간 및 성과제출물

구분(년차)	과업기간 (390일)	과업 성과물	비 고
25년	120일	계획설계 납품 및 발주처해당 요구 자료
26년	270일	잔여 중간 및 실시설계 납품 등

[붙임 1]

보 안 각 서

1. 용  역  명 :

2. 계약  일자 : 202 .   .   .

3. 착수  일자 : 202 .   .   .

4. 완수예정일 : 202 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 취득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주처에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주처에게 귀속됨을 알고 별도로 발주처의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202 년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

국립군산대학교 귀하

[붙임 2]

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아        래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

국립군산대학교 귀하

[붙임 3]

설계용역 검사원

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙임 : 납품설계도서 목록  1부

설계용역이 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

국립군산대학교 귀하

[붙임 4]

주간공정보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ~ 202 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주 진행사항(202 . . .)	금주 예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	-인원투입현황 -작업진행현황 등 -주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 -건축, 실내건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 등 분야별로 구분 되도록 작성		-실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

국립군산대학교 귀하

[붙임 5]

월간공정보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ~ 202 . . .)	비 고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익 월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

국립군산대학교 귀하