- 군위 세대희망 허브센터 건립사업 -

기본 및 실시설계용역 과업지시서

2022년  10월

	군 위 군

목    차

1. 설계 일반사항	1

1. 설계 개요	1

2. 설계용역 일반사항	4

3. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준	9

2. 설계 진행사항	11

1. 설계도서 작성	11

2. 설계의 진행	11

3. 설계 일반지침	15

1. 일반사항	15

2. 분야별 설계 일반지침	16

가) 건축 분야

나) 토목 분야

다) 조경 분야

라) 기계설비 분야

마) 전기설비 분야

바) 소방설비 분야

사) 정보통신 분야

아) 전시체험시설 분야

3. 설계도서의 분리 작성	23

4. 설계도서 표기	24

5. 도면작성	24

4. 과업 단계별 지침	25

1. 계획설계	25

2. 기본(중간)설계	27

3. 실시설계	32

4. 에너지효율등급 인증 분야	39

5. 녹색건축물 인증 분야	39

6. 장애물 없는 생활인증제도(BF) 인증 분야	39

5. 설계도서 납품목록	40

1. 일반사항	40

2. 계획설계 납품도서	40

3. 기본(중간)설계 납품도서	40

4. 실시설계 납품도서	41

6. 서식(보안각서)	43

제1장 설계 일반사항

1. 설계 개요

가. 과 업 명 : 군위 세대희망 허브센터 건립사업 기본 및 실시설계용역

나. 과업의 목적

◦ 군위 세대희망 허브센터 조성으로 지역주민들의 급증하는 문화·교육·복지 수요에 대응할 수 있는 인프라를 구축하고, 세대 및 계층을 아우르는 사회통합기능을 수행할 수 있는 거점시설 역할을 기하고자 함

다. 대지위치 및 면적

1) 과업위치 : 군위군 군위읍 서부리 45-1일원 (현 군위 인재양성원 일원)

2) 부지면적 : 5,821㎡

3) 연 면 적 : 3,354㎡(연면적±5% 내외, 발주기관 요구에 따라 변경 가능)

※입체주차장 연면적 미포함

4) 층    수 : 군위 세대희망 허브센터(지하1층, 지상4층), 입체주차장

5) 예정공사비 : 8,957백만원(부가세 포함)

※ 과업규모는 참고사항이며 군정 계획 조정 및 설계용역 착수 후 관련 기관‧부서‧단체 등과 설계진행 협의 과정에 변경될 수 있으며, 설계과정에서 군위군 (발주기관)과 계약상대자 (이하 수급인)가 협의하여 조정될 수 있습니다.(제반 법규 적합 여부는 별도 검토하여야 한다.)

※ 과업범위의 변경이 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.(용역계약 일반조건 등 참조)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 기계설비, 폐기물 처리, 에너지효율등급 예비인증 장애물 없는 생활환경인증 수수료 등에 대한 총공사비임 (발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

6) 설계용역비 : 금441,800,000원(부가가치세 및 손해배상책임보험 포함)

라. 설계기간

1) 착수일로부터 270일로 하되 계획설계, 중간설계, 실시설계 등 세부 기간은 협의하여 조정 할 수 있다. 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무 및 관련 자료의 제출과 설계 미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행하여야 하며, 다음 경우에 한하여 업무담당자의 승인을 득하여 과업 수행 기간을 연장할 수 있다.

(1) 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

(2) 설계발주처의 방침에 의하여 과업 시행이 중단되었을 경우

(3) 설계발주처의 사업계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

2) 설계용역 기간 중 건설기술진흥법령에 의한 건설기술심의위원회 심의, 건축 등 심의위원회 심의, 설계자문위원회 심의 및 건축허가 등에 소요되는 기간은□설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침□(국토교통부고시 제2021-981호) 제23조(설계기간)에 의하되 협의하여 결정한다.

마. 시설규모

1) 부지면적 : 5,821㎡

2) 시설규모 : 3,354㎡ (지하1층, 지상4층) <±5% 내외>

※입체주차장 연면적 미포함

3) 용    도 : 제1종근린생활시설

4) 주요시설 : 키즈카페, 장난감도서관, 진로체험실, 교육공간, 멀티 플랙스실, 마을방송국 등

5) 구    조 : 철근콘크리트구조 등 적합한 구조 반영

6) 부대토목 : 부지조성, 포장공, 배수공, 구조물공, 조경공, 상하수도공, 부대공 등

7) 조경공사 : 광장(무한상상놀이터, 드림한마당), 휴게공간, 식재공간, 바닥포장 등

8) 건축기계설비, 건축전기설비, 정보통신설비, 방송설비, 소방설비, 유선방송 수신설비 등

바. 공사비 예산 : 8,957백만원 (VAT포함)

제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거, 폐기물처리 등에 대한 공사비이며 공종 간 배분하여 공사비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 하며, 과업물량 증가, 물가상승 등에 따른 공사비 증가가 예상될 시 발주청과 사전에 협의토록 한다.

사. 용역 범위

1) 설계 범위

건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 전 분야의 설계지침에 따른 계획설계, 중간설계, 실시설계도서의 작성

※ 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는

수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

2) 용역 범위

(1) 실시설계도서 작성

(2) 설계관리 일정표 작성

(3) 공정표 작성 (산출근거 작성 : 예산 확보 범위내 순차적인 공사 진행)

(4) 폐기물(지정, 건설)처리 내역서 및 시방서

(5) 기술심의 및 각종 관계법령에 의한 인․허가 및 협의에 따른 관련 서류 일체 작성

(6) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

(7) 녹색건축 인증(수수료 발주기관 별도 지급)

(8) 에너지절약계획서 작성(수수료 발주기관 별도 지급)

(9) 건축물에너지효율 등급 인증(수수료 발주기관 별도 지급)

(10) 제로에너지 건축물 인증(수수료 발주기관 별도 지급)

(11) 장애물 없는 생활환경 예비인증(BF)(수수료 발주기관 별도 지급)

(12) 본 용역은 발주자와 계약상대자가 체결한 용역으로 계약서 및 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 수반되는 관련 조사 및 건축협의 등에 필요한 도면과 구비서류, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의 작성 등, 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

➀ 계획설계도서 작성

➁ 중간설계도서 작성

③ 실시설계도서 작성

(13) 건축물의 현장 조사 및 검사에 관한 업무

(14) 에너지 절약형 설계 반영내용 및 절감 효과 분석 자료 제출

(15) 각종 인.허가(건축협의 등) 및 심의에 필요한 서류작성 및 제출

(16) 설계의 안전성 검토 등에 따른 심의에 필요한 서류작성 및 제출

(수수료 발주기관 별도 지급)

(17) 각종 보고서 작성 및 인쇄 (조감도 포함)

(18) 가종 위원회, 설계보고회 등에 대한 업무수행

(19) 설계심의, 공사계약심사 수감 및 지적사항 보완 등

(20) 본 용역이 완료된 후라도 발주청의 인․허가(협의사항)에 따른 서류 보완이   필요하여 발주청의 요청이 있을 시 적극 협조해야 한다.

(21) 본 용역을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주자와   협의 하에 수행한다.

2. 설계용역 일반사항

가. 설계용역의 정의

1) 본 설계용역의 최종도면은 건축법, 소방시설 관련법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 지적법 등 제반 관련 법령과 각종 고시 및 공고 기준에 위배됨이 없이(관계기관과의 건축협의, 소방협의 등 포함) 완료되어야 하며 법령 등이 개정 되었을 경우에는 개정된 규정을 반영하여 설계하여야 한다.

나. 설계도서의 납품

계획설계와 중간설계 및 실시설계를 구분하여 납품하도록 하되 심의․자문․협의 등 전반적인 일정과 설계용역 기간 등에 따라 일괄 납품 조정할 수 있다. 납품도서 작성방법, 부수는 본 과업내용서 제5장 설계도서 납품도서 목록에 정하는 바에 따르거나, 발주청과 협의하여 조정할 수 있다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 책임 및 손해에 대하여는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·시행령·시행규칙, 지방자치단체 용역계약일반조건, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 설계․건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령, 건축사법 제20조 및 건축사법 시행령 제21조에 따르며, 보험증서 또는 공제증서를 용역 준공 시 제출하여야 한다.

2) 납품 이후에 공사 중 발생되는 설계변경사항(설계도서 간 모순 및 현장여건에 의한 변경)에 대하여 기술적 자문과 협조 요청에 대하여 공사 일정에 차질이 없도록 적극적으로 협조하여야 한다.

3) 다음 경우에는 과업기간을 정지하거나 변경할 수 있다.

가) (계약예규)용역계약 일반조건 제19조(계약기간의 연장)

나) (계약예규)용역계약 일반조건 제29조, 제30조, 제31조(계약의 해제․해지)

다) (계약예규)용역계약 일반조건 제32조, 제33조(용역의 일시정지)

라) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

마) 각종 행정절차 이행 등으로 지연될 경우 최종 행정절차 이행시까지 용역을 중지할 수 있다.

4) 본 과업 수행 시 과업 참여기술자의 퇴직 등 변경이 불가피하여 변경할 경우 사전에 발주청의 승인을 받아야 하며 동등 이상 기술자를 배치하여야 한다.

5) 설계의 하자(설계 누락) 책임

“수급자”는 설계상의 하자(누락 등)로 인하여 설계 및 시공(설계변경) 시 공사비

등 증액, 인명의 피해, 기타 공사 진행상 상당한 지장을 초래하였을 때는 계약기간

만료 이후에도 관계법령에 따른 처벌(부실벌점 부과 등) 이에 대한 모든 책임

(설계서 재작성 등 수정 등에 따른 모든 비용을 부담)을 진다.

6) 용역 성과의 소유

“수급자”가 제출한 모든 용역 성과는“발주자”의 소유로 한다.

7) 계약조건

발주처에서 다음과 같은 조건이 발생되면 일방적으로 계약을 해지할 수 있다.

가. 설계용역 이행이 불가능하다고 인정될 때

나. 발주처의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

다. 기타 용역계약 조건을 위반할 때

라. 하도급 범위

1) 수급인은 발주기관의 서면 승인하에 본 계약에 따른 용역업무의 일부를 하도급

(기술제휴, 기술협력 포함) 할 수 있다. 이 경우 하도급 관련 법령에서 정하는

하도급의 적정성이 보장되어야 한다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 용역수행에 필요한 각종 조사 작업

② 지장물 조사 및 이에 부수되는 시험 등 작업

③ 구조계산 및 검토 등에 관한 업무

④ 건설공사의 수량산출 및 내역서 작성업무

⑤ 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급 업무에 대하여 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수

있으며 하도급 된 당해 업무에 대해서 모든 책임을 진다.

4) 발주기관은 승인된 하도급 용역의 수행에 있어서 당해 하도급 계약자가 용역업무  추진 능력이 없다고 인정되거나 성실히 그 의무를 다하지 않을 경우에는 설계자에게  하도급 계약자의 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 수급인은 특별한 사유가 없는 한  하도급 계약자를 교체하여야 한다.

마. 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 용역의 감독

1) 수급인은 발주기관에서 임명하는 감독관의 지시를 받아서 본 과업을 수행하여야 한다.

2) 과업 및 계약서 내용이 상충되거나 의문이 있을 경우 감독관의 지시에 따른다.

3) 감독관은 과업 수행 중 용역 대리인이나 수급인이 과업수행에 부적당하다고 인정될 때에는 즉시 교체를 명할 수 있으며, 수급인은 지체없이 이행하여야 한다.

사. 설계의 기본방향 및 개요

1) 중점사항

가) 지역주민들의 문화·복지·교육 등을 아우르는 중심지 거점시설로 군위군의 공공적 가치를 구현하고 실용적이며 창의적인 설계 필요

나) 실외 및 광장과 연계한 실내외 공간구성 및 부지 내 접근성과 인지성, 사용성 등을 고려한 적정한 건물과 실의 배치, 시설물 유지관리의 용이성을 고려한 합리적인 설계 필요

다) 부족한 주차수요를 고려한 주차 공간을 확보하며 주변 시설과 조화를 이루고 상호 연계되는 주차시설 계획

라) 대지의 주변 현황을 고려하여 안전성이 확보된 조화로운 설계

마) 전기 및 정보통신 분야(특히 LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용하여

전화, LAN선 등 충분한 통신회선 반영

바) 모든 기준은 설계 당시 기준으로 개정된 최신 법령에 해당하는 기술 기준을 필히   적용

2) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) 창호, 내외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계

나) 전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재 사용 및 고효율 시스템 설계

다) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 활동 및 환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

라) 시설 이용자의 쾌적성과 편리성, 안정성이 확보 필요 반영

마) 건축물 에너지효율등급 인증에 따른 예비인증(1++등급)을 받아야 하며 설계납품 도서에는 본 인증을 받아 발주청에 건축물을 인계하여야 함을 시방서 등 설계도서에 명시하여야 한다.(인증 등급은 협의에 따라 조정될 수 있음)

바) 설계 시 LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감 방안을 고려하여 계획할 것

3) 환경 친화적 부지환경 조성 및 친환경적 설계

가) 합리적인 부지 이용으로 쾌적한 환경조성과 장래 증축 검토중인 타용도 건축물 건립시 연계성 검토

나) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

다) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

- 소음진동관리법 제23조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치기준 등)에 맞게 설계

라) 녹색건축 인증에 관한 규칙(국토교통령 제831호) 및 녹색건축 인증 기준(국토교통부 고시 제2021-278호)에 적합한 설계를 하여 예비인증[(우수등급)그린2등급]을 받아야 하며 설계 납품도서에는 본 인증을 받아 발주청에 건축물을 인계하여야 함을 시방서 등 설계도서에 명시하고 본 인증 수수료를 공사비 내역서에 포함하여야 한다.

마) 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙(보건복지부령 제839호) 및 장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료 기준 등(국토교통부고시 제2022-156호)에 적합한 설계를 하여 예비인증을 받아야 하며, 설계납품도서에는 본인증을 받아 발주청에 건축물을 인계하여야 함을 시방서 등 설계도서에 명시하고 본 인증 수수료를 공사비 내역서에 포함하여야 한다.

4) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

5) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조 안정성이 확보된 설계

나) 지반조사보고서(발주청 별도 발주)의 결과에 따라 합리적인 기초계획이 이루어진 설계

6) 설계 모델(안) : 당선 이후 발주처와 협의 후 구체적인 사용자의 의견이

반영된 시설이 조성될 수 있도록 수요기관의 의견을 적극 수렴하여 스페이스

프로그램의 조정 및 설계에 반영하여야 한다.

7) 친환경 건축물 인증, 신재생에너지 설비 등 관련 규정 인증 수준의 설계 외

당해 사업과 관련된 법령, 고시, 지침 등을 준수하여 쾌적한 환경조성을

위한 품질 관리를 제고한다.

아. 설계변경 및 정산

가) 발주청은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정될 때에는 설계 용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 발주청의 방침에 따라야 한다. 이때 과업 범위의 증감이 발생할 경우에는 예산의 범위내에서 당해 계약금액을 조정할 수 있다.

나) 이때 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 및 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약 일반조건 등에 따른다.

3. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준

가. 법령 등의 적용기준

1) 설계자는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방시설 관련법 등 관련법규 상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서 등으로 협의하여야 한다.

2) 본 설계용역의 성과품은 제5장 설계도서 납품목록에 의하되 본 과업과 관련 있는 최근의 관련법, 시행령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 제출되어야 한다.

○ 건설기술진흥법/시행령/시행규칙

○ 건설산업기본법/시행령시행규칙

○ 건설현장 축중기 설치지침

○ 건축법/시행령/시행규칙

○ 건축사법/시행령/시행규칙

○ 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙

○ 건축물의 설비기준 등에 관한규칙

○ 건축물의 구조기준 등에 관한규칙

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률/시행령/시행규칙

○ 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법/시행령/시행규칙

○ 도시교통정비촉진법/시행령/시행규칙 및 교통영향분석․개선대책수립지침

○ 물의 재이용촉진 및 지원에 관한법률/시행령/시행규칙

○ 상수도법/시행령/시행규칙

○ 지하수법/시행령/시행규칙

○ 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률/시행령/시행규칙

○ 소방법/시행령/시행규칙

○ 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률/시행령/시행규칙

○ 소음진동관리법/시행령/시행규칙

○ 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법/시행령/시행규칙

○ 에너지이용합리화법/시행령/시행규칙 및 건축물의 에너지절약설계기준

○ 엔지니어링산업 진흥법/시행령/시행규칙

○ 자연재해대책법/시행령/시행규칙 및 사전재해영향성검토협의 실무지침

○ 장애인․노인․임산부등의 편익증진 보장에 관한법률/시행령/시행규칙

○ 전기공사업법/시행령/시행규칙

○ 전기사업법/시행령/시행규칙

○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법/시행령/시행규칙

○ 전력기술관리법/시행령/시행규칙

○ 전파법/시행령

○ 정보통신공사업법/시행령/시행규칙

○ 주차장법/시행령/시행규칙

○ 녹색제품 구매촉진에 관한 법률/시행령/시행규칙

○ 중소기업제품구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률/시행령/시행규칙

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률/시행령/시행규칙

○ 측량법/시행령/시행규칙

○ 폐기물관리법/시행령/시행규칙

○ 하수도법/시행령/시행규칙

○ 환경정책기본법/시행령

○ 건축물 마감재료의 난연성능 및 화재확산방지 구조기준

○ 건축구조기준

○ 공공발주사업에 대한건축사의 업무범위와 대가기준

○ 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침

○ 엔지니어링사업대가의 기준

○ 주택의 설계도서 작성기준

○ 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역 고시

○ 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준

○ 녹색건축 인증 기준

○ 건축물 에너지효율등급 인증기준

○ 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙

○ 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증 심사기준 및 수수료 기준 등

○ 조경기준

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준

○ 어린이 놀이시설 안전관리법/시행령/시행규칙

3) 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등), 동법 시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 건축물의 설계도서 작성기준, KSF1501, KSF1505, KSF1509 등 관련 규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주청과 협의 후 후속 작업을 실시한다.

제2장 설계 진행사항

1. 설계도서 작성

설계도서의 작성방법은 발주청이 정하는 소정 양식에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주청과 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주청이 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속 작업을 진행하여야 한다.

2. 설계의 진행

가. 설계착수 제출서류

1) 설계자는 용역 착수 시 계약일로부터 14일 이내에 다음의 제반서류를 제출하여야 한다.

(1) 착수계 1부

(2) 책임기술자 선임계 1부

(3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

(4) 설계용역수행 조직표 1부

(5) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 기타)의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용명기, 기술자격증사본, 기술경력증명서 각 1부

(6) 설계용역 예정공정표(계획, 기본, 실시설계의 납품예정일자 명시) 1부

(7) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(착수계 제출시)

(8) 보안각서 각 1부

(9) 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 사항

※ 수급인은 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 준공 기한 연기원

③ 준공 검사원

④ 하도급 통지 또는 하도급 승인요청

⑤ 기타 용역 수행에 필요한 서류

2) 과업수행계획서

계약상대자는 착수 신고 시 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 발주기관은 제출된 내용이 미흡하거나 변경요인이 있을 시 계약상대자에게 수정을 요구할 수 있다.

① 계획서에는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등의 건축 관련 모든 업무가 포함되어야 한다.

② 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

※ 전문분야별 기술자 중에 견적 및 내역 작성업체, 설계단계의 사업관리용역업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 작성하여야 한다.

③ 건축구조, 기계설비, 전기, 통신설비, 토목, 조경, 소방 등 전문분야는 관계법령에 적합한 해당분야 기술자격 소지자로 하여금 수행토록 하되, 건축사가 총괄하여야 한다.

④ 설계품질 보증계획

⑤ 목표예산을 고려한 설계운용계획(Design to Cost)

a. 발주청이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공시 설계변경에 의한 과다한 공사비 증액이 발생하지 않도록 수급인은 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

b. 본 과업내용 중 설계지침 상 친환경적 계획요소로서 자원의 효율적 활용등 설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 소요 공사비용을 면밀하게 검토, 제출하여야 한다.

c. 상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 다음 항에서 규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 발주청의 승인을 득하여야 한다.

⑥ 제출된 과업수행계획서에 대하여 발주청이 보완 및 수정을 요구하는 경우 특별한 사유가 없는 한 수급인은 이를 반영하여야 한다.

⑦ 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

나. 업무보고 및 회의

설계자는 설계 진행 시 정기적으로 설계용역 진행사항을 보고하여야 한다.

1) 업무 보고

(1) 주간 공정 보고 (발주청과 협의하여 부분 생략할 수 있음)

※ 진행상황은 FAX(전송) 또는 E-mail로 제출 가능함

(2) 월간 공정 보고

발주청 감독관과 협의하여 매월 협의 일자를 기준으로 업무수행 사항 및 예정         사항을 작성하여 제출하여야 한다.

(3) 수시 보고

설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 발생 시마다 제출하고, 발주청 요청 시 수급인은 설계 진행사항을 보고하여야 한다.

※ 보고서 서식은 임의로 하되 용역 진행 상황을 일목 요연하게 작성한다.

2) 업무 보고회 및 회의

(1) 일반사항

가) 착수보고회, 계획설계, 중간(기본)설계, 실시설계 등 설계 각 단계별 업무

보고회 전에 발주처와 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

나) 본 설계 내용서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에

대하여는 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 설계 내용서에 대한 대안을 제시할 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주청의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 발주청은 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출․요구하여 수정․보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

마) 설계자는 자문회의 등 각종 회의 시 적극적으로 임하여 용역사 참석 범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석 토록 하여야 한다.

(2) 착수 보고회

가) 착수보고회는 착수일로부터 30일 이내에 개최하여야 하며 장소와 일자는

발주청과 협의한다.

나) 착수보고회는 사업 책임기술자가 보고함을 원칙으로 한다.

다) 착수 보고 전 사례조사가 완료되면 그 결과 내용을 포함한 보고가 되도록 한다.

(3) 중간 보고회

가) 중간보고회는 계획설계 및 중간설계 완료 후 7일 이내에 발주청과 장소와 일자에 대하여 협의하여 개최한다.

나) 중간보고회는 사업 책임기술자가 계획설계 및 중간설계 내용을 토대로 설계 진행 계획을 설명하고, 월간 용역 공정계획서를 제출하여야 한다.

(4) 최종 보고회

가) 최종보고회는 용역완료 10일 전에 하여야 하며 장소와 일자는 발주청과 협의 한다.

나) 최종보고회는 사업 책임기술자가 실시설계를 토대로 설계의 전반적인 내용을  설명하여야 한다.

(5) 기타 사항

가) 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부 하여야 하며 회의일자는 상호간 일시와 장소를 협의 하여 개최한다.

나) 계획 설계 과정에서 최적 안이 확정되는데 있어 발주청의 요구(회의요구 및   자료제출)에 적극적으로 협조하여 최적 안이 확정되도록 한다.

제3장 설계 일반지침

1. 일반 사항

가. 설계도서 작성 시 '건축물의 설계도서 작성기준' 및 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침에 맞도록 작성하여야 하며, '공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준' 별표1 및 별표2의 단계별(계획설계, 중간설계, 실시설계) 도서내용의 도서작성 구분 중급 이상을 기준으로 하되 감독관과 협의하여 부분적으로 항목을 조정 할 수 있다.

나. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안되며 감독관과 협의에 따라 이행한다.

다. 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 기타 부대공사에 대한 설계는 관련 법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

라. 설계는 에너지 절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

마. 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

바. 설계자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사 시 도로의 연결관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

사. 장애인 등에 대한 편의시설은 법에서 정한 기준 이상으로 설계하여야 한다.

아. 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」,「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따라 녹색제품 및 공사용 자재 직접구매 대상품목을 관급자재로 구매 반영하여야 한다.

2. 분야별 설계 일반지침

가. 건축 분야

1) 일반 사항

가) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

나) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

다) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

라) 벽면은 화장실, 보안성이 중요시되는 실 등을 제외하고는 가변성이 확보되도록  설계하여야 한다.

마) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 인력과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

바) 건축법에서 정한 규정 즉, 법, 령, 규칙 및 고시 기준 ․ 지침, 훈령 등 을 숙지하여 설계하도록 하며, 특히 복도의 유효 너비는 '건축물의 피난·방화구조  등의 기준에 관한 규칙' 의 기준 이상으로 계획 ․ 설계하여야 한다.

사) 천창을 설계에 반영할 경우에는 천창에서 발생할 결로 유도에 대한 세부상세도를 작성하여 발주청에 제시하여야 한다.

아) 다양한 프로그램이 복합되는 시설이므로 이용자의 편의를 위하여 건축물의 효용성을 높이고 시설의 분리·연계를 명확히 제시하여 합리적인 시설계획을 설계하여야 한다.

2) 구조 계획

가) 기능이 적절한 구조

나) 안전한 구조

다) 경제적인 구조

라) 지반조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

마) 건축법48조, 동법 시행령32조, 91조의3, 동법 시행규칙 36조의2 에 의한 구조안전 및 관계기술자 협의, '건축물의 구조기준 등에 관한 규칙' 및 '건축물의 구조안전확인 및 협력등에 관한 업무지침', '건축구조기준'에 적합하게 설계하여야 한다. 특히 지진하중에 대한 구조계획 시 지진구역 지역계수, 지반종류, 내진등급을 '건축구조기준'에 따라 정확하게 적용하여야 하며, '건축물의 구조기준 등에 관한 규칙' 제58조에 따라 구조안전 확인서를 제출하여야 한다. 필요시 설계안전성 검토를 득하도록 한다.

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내 자재 중 K.S.품 사용이 원칙이며 K.S.품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주청과 협의하여 선정한다.

다) 부득이 수입 자재 등을 사용 시에는 사전에 발주청과 협의하여 결정한다.

라) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

마) 관급자재는 중소기업제품 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조 및 중소기업제품 공공구매제도 운영요령 제5장(중소벤처기업부고시 제2021호-66호

(2021.10.01.), 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역 (중소벤처기업부고시 제2022호-24호(2022.04.01.)에 의거 직접구매 대상 품목을 정하여 선정하여야 한다.

나. 토목 분야

1) 일반 사항

가) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전 조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

나) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

다) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도는 세분하여 작성한다.

2) 구내 우․오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배출될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150 ~ 200㎜ 이상이 되도록 한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위 내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

바) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 한다.

3) 도로 및 포장 설계

가) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 도로 및 주변 광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

라) 지반조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 주변도로 및 포장 설계 시 P.P. Mat 및 PET Mat 등 적용을 검토하여야 한다.

마) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

4) 상수도 설비

가) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단 거리로 설계에 반영한다.

나) 상수도는 대상건축물과 연계하여 설계하여야 한다.

5) 기 타

가) 부지 경계부근은 도로, 인접토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

나) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

다) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

다. 조경 분야

1) 일반 사항

가) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고 건물, 주차장 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

나) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

다) 차량 동선 및 보행자 동선, 건물 내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 수경공간, 운동공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

라) 조경은 가급적 자연지형을 이용하여 계획하여야 한다.

마) 조경은 해당 지역의 조례 등을 고려하여야 하며 이용자, 사용자 편의 및 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

2) 조경 수목

가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

다) 단지 내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

라) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수 간의 거리를 확보하여야 한다.

마) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역에 식재 하여야 한다.

3) 조경 시설물

가) 벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등 시설물은 관련 규정에 의하되 이용자 편의와 활용성을 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

나) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안 하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조 안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이 하여야 한다.

다) 산책로 또는 조경 포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적인 재료를 사용하여야 한다.

라) 필요에 의하여 옥상조경이나 실내조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

마) 케이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성 담당 감독관과 협의하여 결정한다.

바) 준공 표지석 또는 표지판(내역반영), 설치 위치는 담당 감독관과 협의하여 결정한다.

라. 기계설비 분야

1) 일반 사항

가) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 등 기타 조건에 적합하게 설계한다.

나) H.V.A.C. 설비, 위생설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주청의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

2) 일반 지침

가) H.V.A.C.(Heating Ventilating Air Conditioning) 설비

- 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

- 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.

- 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 가능하도록 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

- 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 하여야 한다.

나) 위생설비

- 급수방식은 현장상황에 따라 발주청과 협의하여 반영한다.

- 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

- 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

- 지역난방, TES, CES 등에 따른 급탕방식은 그 방식의 기준을 따른다.

- 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

- 위생기구는 K.S 제품 또는 동등 이상 품을 사용한다.

다) 자동제어설비

자동제어설비는 각 건물 규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

라) 기타설비 : 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

마. 전기설비 분야

1) 일반 사항

가) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

나) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

다) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

라) 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

2) 일반 지침

가) 수변전 설비

- 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

- 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

- 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

나) 동력공사

- 전동기의 용량에 알맞는 개폐기 및 전선굵기로 선정하여야 한다.

- 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

- 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

- 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

다) 조명설비공사

- 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

- 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 실폭 등을 고려하여야 한다.

- 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토하여야 한다.

- 건축물의 부분경관조명, 옥외가로조명, 부분연출조명을 고려 계획안을 감독관과 협의 결정한다.

라) 전열공사

- 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

- 용도에 적합한 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

바. 소방설비 분야

1) 일반 사항

가) 소방시설은 면적에 따른 소방시설을 선정 후 소방법, 동법시행령, 동법 시행 규칙, 화재안전기준 등의 관계법규에 적합하게 계획한다.

나) 소화설비의 적용범위 및 기준에 따른 기기의 적정용량, 대수, 형식 등을 적절히 계획한다.(소화기구, 옥내외 소화전, 스프링클러, 소화용수설비, 연결송수관, 피난기구 등)

다) 관할 소방서와 소방시설의 적용에 대하여 협의한다.

라) 최근 개정된 법령 중 기계소방, 전기소방에 해당하는 기술기준을 적용한다.

2) 일반 지침

가) 소화설비

- 소방시설 관련법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

나) 소방설비공사

- 소화전 설계는 별도로 설계한다.

- 높이 8m 이상일 때는 연기감지기 1개당 감지면적은 50㎡ 이하로 한다.

- 감지기는 1종 이온화식과 차동식 열감지기, 정온식 감지기는 LED부착 신형을 사용한다.

- 자동화재 탐지설비와 유도등 전원은 분전반에서 별도 분기한다.

- 1개의 감지구역은 각 실마다 설치하고 경계구역은 별도 지정한다.

- 감지기 회로 공동선 접속은 7개회로 이내로 한다.

- 감지기 배선은 송배선 방식으로 하며, 내열전선으로 설계한다.

- 자동화재 탐지설비 배관은 별도의 배관으로 설계한다.

- 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여야 한다.

사. 정보통신 분야

1) 일반 사항

가) 시설의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다.

나) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다) 설계 시 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

- 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

2) 일반 지침

가) 전화설비

- 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

- 교환실의 위치, 교환기의 형식 및 전화수구 수량이 적정하여야 한다.

- 교환대의 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

나) LAN 설비

- 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

다) 약전설비공사

- 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

- MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

라) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

3. 설계도서의 분리작성

가. 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 등 공종별로 분리하고 발주 단위공사별(건축+토목+기계설비/조경/전기/통신/소방/폐기물)로 내역을 작성하여야 한다.

※ 도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등

나. 공사용 관급자재는 철근, 레미콘뿐만 아니라 중소기업청 고시로 지정 고시된 품목을 설계에 반영하고 발주청이 직접 구매할 수 있도록 관급자재로 분리작성 하여야 한다.

4. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 용역계약 일반조건 제5조에 따라 사용언어는 한국어를 원칙으로 한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다. 또한 설계도면에서 1~2회 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 한다.

다. 도면의 표기내용은‘건설CALS/EC 전자도면 작성표준’에 따라 작성한다.

라. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 :  EF)

7) 통신도면 : T

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및    시공이 용이 하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 소방, 통신, 소방, 기타 부대설비 등 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

5. 도면 작성

가. 제도용지는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

라. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방도면은 발주청의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계도면에는 '건설기술진흥법 시행규칙' 제43조에 따라 모든 면에는 참여기술자가 확인한 후 서명 날인하여야 하며 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

제4장 과업 단계별 지침

1. 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 기획업무 내용에 따라 현장조사 및 자료 수집내용을 근거로 건축물의 규모, 예산, 기능, 품질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등)의 기본시스템을 검토하여 발주청의 요구조건을 반영한 계획(안)을 발주청에 제안하여 승인을 받는 단계이며 본과업과 관련하여 계획설계 단계의 도서 납품은 발주청과 협의하여 진행하고 기본설계 착수단계와 준공단계에 포함하여 진행한다.

나. 일반 사항

1) 설계자는 대지의 주변상황을 참고로 하여 계획설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주청의 승인을 받은 후 기본설계를 진행하여야 한다.

2) 설계자가 제출한 계획안이 부적합하다고 발주청이 검토의견을 통보 시 설계자는 조속한 시일 안에 새로운 대안을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 발주청이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완․제출하여 발주청의 승인을 득한 후 계획설계는 기본설계기간에 포함하여 진행한다.

다. 계획(안) 작성 시 고려사항

1) 설계설명서[현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요, 동선계획, 우․오수계획, 지하수 이용 등]

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master Plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체 주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 건물별 개략 평면 및 입면계획

6) 건물 입면형태 및 주변과의 조화

7) 조경계획

8) 개략공사비 산정

9) 기타 필요한 사항 및 발주청 요구사항

10) 세부시설 설계계획(안) 배치계획

라. 현장 조사방법

현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

1) 관계기관(부서) 협의

세부시설의 관리 및 운영주체의 협의하에 편리성, 동선, 면적 환경 등 전반적인 사항을 조사하여야 한다,

시설의 사용 인원, 계층, 연령 등을 고려하여 사용에 불편이 없도록 조사한다.

2) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 기상통계에 의한 과거 기상기록 통계자료 조사

- 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례 등 특이한 사항을 모두 조사하여야 한다.

3) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원 요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오폐수처리방법, 지하관정, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

4) 자연환경조사

- 기상 : 기온, 습도, 풍향, 풍속 등을 조사 설계에 반영한다.

- 지형 : 경사도, 지표상태 등을 조사 설계에 반영한다.

- 식생 : 수목 및 식생의 조사 및 양호한 경관을 검토 반영한다.

5) 인문환경조사

- 지역사회의 성격 : 지역의 성격, 인구 및 산업 등 성격을 조사 반영한다.

- 토지이용 : 대상지의 토지이용 상 여건을 조사한다.

- 지리적 특성 : 주변의 역사, 유물, 향토수종 등 시설지와 연관이 된 지리적 특성을 조사 분석한다.

2. 기본(중간)설계

가. 정의

“중간설계”(본 과업에서는 기본설계와 동일한 의미)라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주청으로 부터 승인을 받는 단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정 ․ 보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산 등 구조계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주청의 승인을 받는다.

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 계획설계내용

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 개략공사비 산정, 주요자재계획

※ 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 이해를 돕기 위해 3D자료(MAX,스케치업등) 활용 가능함.

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동,내진 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로  경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치, 기타 시공에 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지 구적도

- 건축(연)면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요 구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

※ 지반고는 측량 결과에 따라 계획하여야 한다.

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

다) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 및 기타 산출근거

라) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적표(배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 조형물, Pergola, Bench, 음수대, 휴지통, 안내판 등 조경시설물

4) 기계설비

가) 설계 설명서

설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항

(발주청의 지침을 받아 작성)

다) 설계 계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면 종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설 비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방 배관, 공조 덕트, 위생 배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종 설비 평면도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각 실별 조도계산서

- 부하산출서, 수배전 설비용량 계산서, 전압강하 계산

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치

- 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전 설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타 설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비 기타 설비 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

- 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 회선 용량계산서, 전계강도 계산서, 교환기 용량계산서

- DVR 용량계산서

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등) - 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요설비의 배치도

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

3. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 계획설계 및 중간설계(기본설계)를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주청의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반 사항

1) 중간설계(기본설계)를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정 ․ 보완지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

다. 설계도서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부 시공방법

- 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채 사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조 계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 투시도 또는 조감도 : 천연색채 사용(중간설계단계 성과품)

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도, 단위 평면도

- 각층 천장 평면도 : 시공에 필요한 사항

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항

- 계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항

- 샷다, 핏트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조 배근상세도 : 시공에 필요한 사항

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항

- 각층 기둥․보 위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판류 등

- 기타 시공에 필요한 사항

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 토목

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 시방서

라) 도면 종류

- 위치도            - 종단면도 및 횡단면도

- 평면도            - 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

3) 조경

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도                   - 종단면도 및 횡단면도

- 평면도                   - 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와           유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서, 소방시설 법적기준 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계 계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 공조장비 선정서(습공기선도에 공기상태 표기), 소방시설 법적 기준, 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요 부분 평면도, 단면도

- 범례      - 도면목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 공조, 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항(엘리베이터 건축단면도 포함)

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력,통신,소방,약전,T.V.공청 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에  대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 계산기준 공식

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블트레이 및 덕트 규격 계산서

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의 사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반 간선의 정격설치방범, 설치상세도 등

- 수변전 설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항

- 평면도 : 시공에 필요한 사항

- 단면도 : 시공에 필요한 사항

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

- 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 회선용량계산서, 전계강도계산서, 교환기용량계산서

- DVR 용량계산서

다) 시방서(자재시방서)

- 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)   - 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 (블럭다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체 - 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격

조사자료 등

4. 에너지효율등급인증 분야

○ 건축물 에너지효율 1++등급 인증 기준을 준수하여 설계하여야 한다.

○ 제로에너지 인증 기준을 준수하여 설계하여야 한다.

○ 건축물의 에너지 절약에 관련된 규정 및 설계기준을 준수하여 설계하여야 한다.

5. 녹색건축물인증 분야

○ '녹색건축인증에 관한 규칙' 및 '녹색건축 인증 기준'에 따른 녹색건축인증 “우수등급(그린2등급)”이상의 인증 취득을 고려한 설계를 하여야 한다.

6. 장애물 없는 생활인증제도(BF) 인증 분야

○ '장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률' 제10조의2 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

7. 설계안전성 검토 분야

○ 본 건축물이 안전계획을 수립해야 하는 건설공사에 해당될 시 실시설계는

‘건설기술 진흥법 시행령' 제75조의2 규정 등 관련 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

제5장 설계도서 납품목록

1. 일반 사항

설계도서 작성 시 '건축물의 설계도서 작성기준' 및 ‘설계공모, 기본설계 등의 시행 에 맞도록 작성하여야 하며, '공공발주 사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준' [별표1] 및 [별표2]의 단계별(계획설계, 중간설계, 실시설계) 도서내용의 도서작성 구분 상 중급 기준으로 하되 감독관과 협의하여 부분적으로 항목을 조정 할 수 있다. 계획설계, 기본설계, 실시설계 납품도서 목록은 아래와 같으며 발주청에서 요구시 상호 협의를 통하여 추가로 도서를 납품하여야 한다.

2. 계획설계 납품도서

1) 법규검토                      3) 분야별 계획 평면, 단면, 입면도

2) 계획배치도 및 계획평면도      4) 현장조사내용

※ '계획설계'사항은 3부씩 작성제출(규격 협의)

3. 기본(중간)설계 납품도서

구 분	성 과 품	규 격	수 량	단 위	비 고
1	기본(중간)설계보고서	A4	3	부	계획설계 포함
2	설계도면	A3	2	부	전 공종 분리
3	내역서	A4	3	부	개략공사비 (관급내역서)
4	계산서	A4	3	부
5	시방서	A4	3	부	특기시방
6	USB 또는 SSD		2	SET	상기 내용 모두 포함

1) 발주기관과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

2) 기본설계 보고서에 포함되어야 할 사항은 사전 조사내용, 공사개요, 분야별 설계설명서,

교통동선 분석, 향후 실시설계 방향 등이다.

3) 전체적인 일정을 고려 계획설계와 기본(중간)설계를 일괄 합본하여 납품할 수 있다.

4. 실시설계 납품도서

구분 분야	품 목	규 격	수 량	비 고
건축	실시설계보고서	A4	3부	종결보고서
	설계 설명서	A4	3부	- 전공정 공사예정표 포함
	설 계 원 도	A1	1부	- USB, SSD, 외장하드 등
	설계도 (백도)	1. 반절 칼라제본책(A1) 2. 평철 제본책(A1) 3. A4 규격으로 접은 백도 (좌철) 4. A4 규격으로 접은 백도 (상철)	3부 2부 3부 3부	- USB 또는SSD, 외장하드 ( AUTO CAD 프로그램 ) - 증빙서용 - 건축협의용
	시 방 서	1. 일반시방서 (A4) 2. 특기시방서 (A4) 2. 관급시방서 (A4)	3부	- USB 또는 SSD, 외장하드
	내 역 서	A4	5부	- CD-ROM 또는 외장하드 (EST4+ 프로그램)
	관급 내역서	A4	5부	- USB 또는 SSD, 외장하드
	공 정 표	A4	5부	- USB 또는 SSD, 외장하드
	일위 대가표	A4	3부	- USB 또는 SSD, 외장하드
	단가 산출서	A4	3부	- USB 또는 SSD, 외장하드
	수량 산출서	A4	3부	- USB 또는 SSD, 외장하드
	각종 계산서	A4	3부	- USB 또는 SSD, 외장하드
	투시도 또는 조감도 ( 채 색 ) (중간설계단계 성과품)	1. 90 CM X 120 CM ( 액 자 ) 2. 17.5CM X 11CM (칼라사진)	1부 5장	- USB 또는 SSD, 외장하드
	에너지절약계획서	A1	2부	관련법규에 해당 없을시 제외
	녹색건축인증 자료 에너지효율등급인증자료 제로에너지건축물인증자료 장애물없는환경인증자료 설계안전성검토 자료	A4	각 2부	관련법규에 해당 없을시 제외
기타	○ 사업 착공까지 필요한 각종 인․허가 서류 ○ 기타 발주처에서 공사 시행과 관련하여 제출을 요구하는 성과품 ○ 각종 설계도서, 보고서 및 각종 설계서 등의 내용이 입력된 PC용 USB 또는 SSD, 외장하드 별도 제출 ※ CAD작성시 글씨체는 통상적인 것으로 사용한다

1) 종합보고서는 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 하며, 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

가. 과업의 목적          마. 설계기준                                  자. 시공계획

나. 과업의 범위          바. 구조물 설계안별 검토 내용                 차. 부도(지도, 도표)

다. 과업의 내용          사. 세부 설계내용(공종별 비교 검토내역 포함)  카. 기타 참고자료

라. 사전조사 내용 요약   아. 주요자재 및 수급계획                      타. 기타 요구사항

2) 설계도서(설계설명서, 설계도면, 설계내역서, 각종 계산서 등)는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 기타 공종별로 분리 작성하여 제출한다.

3) 관계기관의 각종 심의, 인증, 인허가에 필요한 설계도서는 별도로 소요 부수를 제출한다.(원본2부, 협의서류 각1부)

4) 전체적인 일정을 고려 기본설계와 실시설계를 일괄 합본하여 납품할 수 있다.

5) 납품도서의 종류와 수량은 발주청과 협의하여 조정할 수 있으며, 납품 후라도 발주청의 추가

요청이 있으면 적극 검토하여 요청에 응해야 한다.

보  안  각  서

1. 용  역  명 : 군위 세대희망 허브센터 건립사업 기본 및 실시설계용역

2. 계 약 일 자 :

3. 착 수 일 자 :

4. 준공 예정일 :

○ 본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 과업수행으로 발생하는 제반 비밀사항과 보안을 요하는 사항에 대하여 지방자치단체 기술용역계약일반조건 규정에 의거 보안유지에 만전을 기하겠으며,

○ 본 과업수행과 관련하여 제3자와의 업무협의가 필요한 경우에도 감독청과 협의하여 보안상에 문제가 없도록 할 것이며, 만약 보안을 소홀히 하여 보안상의 문제점이 발생하였을 때는 어떠한 책임도 질 것을 각서로 제출합니다.

○ 또한, 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 지방자치단체 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 발주청에게 귀속됨을 알고 별도로 발주청의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않겠습니다.

2022.   .   .

주 소 :

성 명 :                   (인)

군위군수  귀하