군위농공단지 청년문화센터 건립사업

건축설계용역 과업지시서

2025.  06.

	군 위 군 (인허가과)

-  목       차  -

제1장 설계 일반 사항

1. 설계용역 개요	1

2. 설계용역 필요사항	5

3. 설계용역 일반사항	5

제2장 설계 진행 사항

1. 설계도서 작성	9

2. 설계진행 시 제출서류	9

3. 업무보고 및 회의	10

4. 보안성 검토	12

제3장 설계 일반 지침

1. 일반사항	13

2. 분야별 설계일반지침	14

3. 설계도서의 분리작성	23

4. 설계도서 표기	24

5. 도면작성 및 서명	25

제4장 설계도서 작성요령

1. 계획설계	26

2. 중간설계	28

2. 실시설계	33

제5장 설계도서 납품목록	40

[부 록]

〔붙임 1〕 보안 각서	43

〔붙임 2〕 책임 기술자 선임계	44

〔붙임 3〕 하도급 승인 요청서	45

〔붙임 4〕 (기본, 실시)설계 검사원	46

〔붙임 5〕 주간 공정 보고	47

〔붙임 6〕 월간 공정 보고	48

〔붙임 7〕 건축 설계도서 내역반영 확인서	49

제1장 설계 일반 사항

1. 설계용역 개요

가. 과업명 : 군위농공단지 청년문화센터 건립사업[건축] 기본 및 실시설계 용역

나. 과업의 목적

본 과업은 농공단지 청년근로자의 주거 부담을 완화하고, 청년근로자의 생활여건 개선 등을 통해 안정적인 정착 지원 및 청년인력확보와 문화 및 기업지원시설 확충을 통하여 지역주민과 근로자의 소통 및 농공단지 기업활성화 증진을 목적으로 한다.

다. 설계 기간 : 착수일로부터 180일(기본설계 60일, 실시설계 120일)

라. 시설 개요

1) 사업위치 : 대구광역시 군위군 군위읍 수서리 561-22 일원

2) 부지면적 : 4,339㎡

3) 연 면 적 : 청년문화센터 1동 990㎡

복지회관 리모델링 1동 657㎡

4) 주 용 도 : 노유자시설(복지회관), 공동주택(기숙사), 제1종근린생활시설(마을회관)

5) 건물규모 : 지상2층 / 지상3층

마. 추정 공사비 : 총 사업비 5,720,000천원 (부가가치세 포함)

총 공사비 4,786,060천원 (부가가치세 포함)

※ 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, (신·재생에너지설비) 및 폐기물처리비. 인입비(전기, 수도, 가스 등) 등에 대한 총공사비이며 공종 간 배분하여 제시된 예산 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

바. 설계 용역비 : 238,700천원

1) 설계 범위 : 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 신재생에너지, 에너지절약계획 및 폐기물처리 등 전 분야의 설계지침에 따른 기본설계 및 실시설계도서의 작성

2) 용역 범위

가) 본 과업은 “군위농공단지 청년문화센터 건립사업[건축] 기본 및 실시설계 용역”에 적용한다.(기본설계는 계획 및 중간설계를 포함한다)

나) 본 과업은 군위군(이하“발주자”라 한다)과 “군위농공단지 청년문화센터 건립사업[건축] 기본 및 실시설계 용역”업자로 지정된 자(이하“수급자”라 한다)간 체결한 용역에 적용한다.

다) 수급자의 용역범위는 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성과 본 용역에 관한 각종 보고(회) 및 제출자료와 발주자가 필요하다고 인정하여 지시하는 사항을 시행한다.

라) 설계도서는 ｢공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준｣ 규정에 의한 중급기준으로 작성하며, 건축사의 업무범위에 한하여 수행한다.

마) 본 용역은 각 분야별 [건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 및 경관, 건축 관련 자문] 설계에 해당한다.

바) 본 용역의 완료는 건축협의(건축 및 디자인 심의 등), 각종 인·허가평가 및 아래의 (예비)인증을 득한 시점으로 한다.(단, 법적 준수 사항만 해당됨)

(1) 「녹색건축물 조성지원법」에 의한 에너지 절약계획을 고려한 설계

(2) 각종자문, 설명회, 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장 작성 등 설계공모로 인한 건축계획 변경에 따른 실시계획인가 변경협의,  등 관련법령 해당 시 서류 작성 및 절차 이행(사업비 변경에 따라 해당시)

(3) 신재생에너지 설치, 제로에너지 인증, BF인증 등은 법적 의무대상은 아니나, 공공의 이용 편의 및 에너지 합리화를 위하여 그에 준하는 시설에 대하여 발주기관과 협의하여 일부 적용하도록 한다.

(4) 기타 공사를 수행하는데 필요한 일체의 설계도서 등의 작성

사) 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 설계지침서 및 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

아) 「건설기술진흥법」에 따라 향후 건설엔지니어링 설계용역평가 대상일 경우 평가 관련 자료를 제출한다.

자) 본 과업은 필요시(설계시 해당요건 검토)「건설기술진흥법」제62조 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」제5조에 따른 설계안전성검토보고서를 작성해야 하며, 계약상대자는 「건설기술진흥법 시행령」제75조의2에 해당이 될 경우 계약상대자는 작성비용을 부담하여 설계안전성검토 보고서를 작성 및 검토결과 ‘조건부적정’이상 나오도록 하여야한다.

차) 본 과업은 해당 시(총 공사금액 50억원 이상)「산업안전보건법」제67조, 같은 법 시행령 제55조 및 같은 법 시행규칙 제86조에 따른 설계안전보건대장을 작성하여야 한다. 단, 건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시 제4조에 따라 안전보건 분야의 전문가에게 적정성 등을 확인 받아야 하며, 해당 비용은 발주기관에서 부담한다.

사. 주요시설 구성(안)

1) 군위 청년문화센터 세부시설 및 면적

각 층별 실 면적표

구 분	세부시설	수량	산출근거		면적(㎡)	비율(%)	비 고
1층	북카페	1			111.4 (+21) =132.4	13%	소그룹강의실은 필요시 실로 분리되나, 북카페와 한 공간 내에 통합하여 계획가능
	소그룹 강의실 (회의실)	1	6~8인
	피트니스 (실내운동공간) + 건강증진코너	1	10명		122	12%	피트니스 내에 건강증진을 위한 검체코너설치 (동시사용3인 가량의 남녀샤워 및 탈의 공간포함)
	소계				254.4	26%
2층	커뮤니티키친 (+코인세탁)	1	16(인)*4m2		64 (+18) =82	8%	코인세탁실은 별도로 구성하거나 커뮤니티키친과 통합 계획가능 커뮤니티키친은 동시에 다수가 취사와 식사가 가능한 구조로 한다.
	기숙사	6	22.1		132.6	13%	1인실 (개인욕실포함)
	소계				214.6	22%
3층	기숙사	10	22.1		221	22%	1인실 (개인욕실포함)
	소계				221	22%
공용공간	화장실	2		1층 2개소	20		장애인 화장실 포함
	홀, 복도, 계단실, E/V 등	-			280.00		공용면적인 로비는 북카페 면적과 일부 통합되어 있음
	소계				300.00	30%
주차공간	옥외	15대 (장애인주차/ 전기차충전시설 1대 포함)			195.5㎡		면적 제외
합 계					990.00	100.0%

2) 군위 농공단지 복지회관 세부시설 및 면적

각 층별 실 면적표

구 분	세부시설	수량	산출근거		면적(㎡)	비율(%)	비 고
1층	식당	1			210	32%	식당 면적에는, 주방, 식자재 창고, 배식대, 퇴식구 등 포함하여 계획 휴게공간은 식당과 통합하여 계획가능
	휴게공간	1
	편의점	1			26	4%	편의점은 하역 과 외부이용객을 고려하여, 외부에서 직접 진입도고려
	사무실	1	운영인력 (위탁)		22.9	3%	2~4명
	소계				258.9
2층	대회의실	1	40인 이상 수용		133	20%	대회의실은 주로 2~30명 회의 / 40명 이상의 강의시 활용 필요시 중회의실(강의실) 2개로 분할하여 사용하는 방안 고려
	소회의실	1	10~12인		27.7	4%
	사무실	1	협의체 사무실		36	5%
	회의실 라운지	1			46.3	7%	공용공간 확보를 위해 설정. 대회의실 진입 전 후 대기 공간 및 휴게공간으로 활용 --> 공용공간면적에 산입
	소계				196.7	30%
공용공간	화장실	4		각층 남녀1개소	44		장애인화장실 고려
	홀, 복도, 계단실, E/V 등	-			112.09
	소계				202.39	31%	기존 공용공간 약160m2에서 라운지설치로 공용공간확보
주차공간	옥외	통합					면적 제외
합 계					657.99	100.0%

2. 설계용역에 필요한 사항

가. 주변경관 및 환경과 조화되고 지역의 이미지를 부각시킬 수 있는 창의적인 외관과 경제적인 구조, 합리적인 기능을 충분히 반영하여 계획한다.

나. 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영한다.

다. 지역 주민과의 화합·융화를 도모하는 친환경적이며 지속가능한 에너지절약형 공공건축물을 계획한다.

라. 급변하는 사회여건의 변화에 부응할 수 있는 가변성, 융통성 있는 공간 구성과   관리자의 시설물 관리 및 운영, 유지관리의 편의성을 도모하여야 한다.

마. 본 사업은 장애물 없는 생활환경인증(BF) 인증의무 대상은 아니나, 시설 이용계층이 다양함으로 모든 시설은 노약자와 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 동선, 편의시설 설치 등 종합적인 무장애 계획을 수립하여 반영하도록 한다.

3. 설계용역 일반 사항

가. 설계 용역의 정의

본 설계용역의 최종도면은 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법, 소방 관련법, 지적법, 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 녹색건축물 조성 지원법, 환경․교통․재해 등에 관한 영향평가법 등 기타 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없고, 조례를 충족하여야 하며, 관계기관과의 건축협의가 완료된 것이어야 한다.

나. 납품

납품은 기본설계 및 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자 등으로 인하여 발생하는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법 제20조 (업무상의 성실의무 등) 제2항 등에 의한 손해배상 책임을 진다.

2) 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축인허가 불가, 구조적인 모순, 주요물량 누락 등)로 인하여 발생하는 모든 사항에 대하여 설계 변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 공사 착수 및 시행 시 관련기관에 제출 하는 설계도서 및 관련서류를 무대로 재작성 제출하여야 한다.

3) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 대하여 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 하며, 설계의도 구현을 위해 설계지원업무를 해야 한다.

4) 발주처의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응해야 한다.

라. 건축법 및 관련법규 검토

설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하고 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련 기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용 한다.

해당지역에 대한 군위군 관리기본계획 변경 후 지침에 따라 적용한다.

마. 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 설계의 기본방향 및 개요

1) 대지의 입지조건에 적합하게 합리적인 설계를 하여야 한다.

- 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 주변건물과 조화롭게 설계

- 대지가 안정성 있도록 하여야 하며 구내도로, 공동구, PIT 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영

- 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계

2) 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설로 설계한다.

- 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로, 외관은 조형성, 독창성 있는 설계로 쾌적한 단지를 조성

- 전화 및 LAN 구축으로 충분한 통신회선 반영 및 공공시설의 내부망 사용을   고려하여 외부망과 혼선이 오지 않게 설계

- 내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변과 조화롭게 설계

- 전기 및 정보통신(LAN 등) 분야는 미래 지향적인 기술기준을 적용

- 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 적용

3) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계로 계획하여야 한다.

- 설계자는 에너지절약에 영향이 큰 주요 장비, 자재, 공법에 대하여는 에너지효율검토서(2개 이상 대안을 검토 내용에 포함)를 작성하여 발주기관에 제출하고,  발주기관이 선정한 안을 설계에 반영

- 에너지효율검토서는 공법ㆍ시스템 선정 등은 기본설계 시, 재질ㆍ규격 등은 실시설계 시에 제출하여 설계에 반영

- 에너지절약형설계의 기본 방향

․ 창호, 내 ․ 외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열, 결로 등 에너지절약형 구조로 설계

･「건축물의 에너지절약설계기준」 제2조(건축물의 열 손실방지 등) 및 제13조   (에너지절약계획서 및 설계 검토서 작성), 건축물의 에너지절약설계기준에 적합한 설계

․ 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

․ 자연채광을 최대한 반영하고 적정 환기로 실내환경을 최적화하고 건물용도와 실에 따른 적정 조도를 반영

․ 열손실이 적으며, 에너지 효율의 극대화를 이룰 수 있는 설계

․ 신에너지 및 재생에너지 사용 적정성 검토

4) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이해야 된다.

- 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계

․ 시설 및 설비는 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

․ 자재 등은 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를
쉽게 구입할 수 있는 것이어야 한다.

․ 각 시설의 설비별로 관리․보수용 점검구, 통로(사다리 등) 작업공간 등을 확보
하여야 한다.

․ 구조설계 시 적용된 적재하중을 명시하고, 각종 마감설계 시 주요 구조부재를
수시로 점검 및 조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구, 통로 또는 마감  방법을 강구하여 실시설계에 반영한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고,
방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

5) 안전성과 시공성이 확보된 설계

- 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

- 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

6) 기본설계 시 친환경계획, 신기술, 특허, 저탄소배출 등의 공법 등을 설계에 적극 반영 하여야 하며, 발주자에게 적용에 따른 품질, 환경, 안전 등과 소요 예정공사비 등을 비교하여 제출하고 협의하여야 한다.

사. 관급 및 주요자재 등

1) 기본설계시 40백만원 이상 예상되는 자재는 직접구매대상 중소기업청 고시품목  해당여부를 검토하여, 설계반영 계획서를 작성 제출하여야 한다.

2) 직접구매 대상품목으로 지정된 품목은 발주자와 협의하여 현지 생산공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

3) 주요 자재 사용계획

- 기능에 적합한 환경친화적인 자재, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

- 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정하며, 사용 자재 및 시공방법 등을 검토하여 선택한다.

※ 근거 규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제86조

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조

아. 본 공사의 시설비와 시설규모 및 대지면적은 수요기관의 사정으로 추후 변경될 수 있으며, 용역계약자는 수요기관의 변경 통보가 있을 경우 별도의 대가 요구 없이   이행하여야 한다.

자. 계약상대자는 본 과업지시서와 건축설계공모 설계지침서(현장설명서 포함) 및 관계법령, 제규정에 따라 성실하게 과업을 수행해야 하며, 관계기관 사업계획승인(협의)·심의 및 인증, 계약심사 등의 행정절차를 수행하여야 한다. 단 인허가 및 심의 등   행정절차 이행에 따른 지연 시 추후 협의에 의해 계약기간을 조정할 수 있다.

제2장 설계 진행 사항

1. 설계도서 작성

가. 설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정양식에 의하고 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주자와 협의한 후 후속 작업을 진행 한다.

나. 본 과업지시서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행하여야 하며,   발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생하는 경우에는 즉시 서면 질의 후 후속 작업을 진행 한다.

2. 설계진행 시 제출서류

가. 용역 착수 시

1) 착수계 2부

2) 책임기술자 선임계

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황

(재직증명서, 기술자격증 사본, 기술경력증명서 등)

4) 설계용역수행 조직표

5) 설계용역 예정공정표(기본, 실시설계의 납품예정일자 명시: A3규격)

6) 계약금액에 대한 산출내역서

7) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 15일 이내 제출) 현황

8) 보안각서 및 청렴서약서 (보안계획서 작성 포함)

9) 계약자(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 기술자격증사본, 기술경력증명서, 재직증명서 등

10) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 계획설계 제출 시

1) 계획설계도서(“공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준”의 중급   도서작성)

2) 계획설계보고서

3) 관련법규 검토서

4) 현장조사, 현황측량

5) 유사시설 견학보고서

6) 공사비검토서, 공종간 업무분장표

7) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

다. 중간설계 제출 시

1) 중간설계도서(“공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준”의 중급 도서작성)

2) 중간설계보고서

3) 내역서(개략공사비)

4) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

5) 중간설계검사원

6) 구조계산서

7) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항(세부 내용 납품목록 참조)

라. 실시설계 제출 시

1) 종합보고서

2) 실시설계도서(“공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준”의 제3종  중급 도서작성)

3) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

4) 건축 인⋅허가 또는 협의(사업계획승인)서

5) 실시설계의 경제성 검토 보고서 및 관련자료

6) 설계검사원

7) 총사업비 검토내역서(공종별 감리내역서, 각종 용역비, 공사비 등 근거자료 포함)

8) 산업안전보건법령에 따른 ‘설계안전보건대장’제출

9) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따른 신재생에너지 계획수립 및 설비 설치계획서(해당시)

10) 손해배상보험증권(보증기간은 공사준공까지 산정)

11) 건설기술진흥법에 따른 설계안전검토보고서

12) 에너지절약 계획서 자료

13) 각종 예비인증서 및 관련 증빙서류(해당시)

14) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항(세부 내용 납품목록 참조)

마. 기타 서류

1) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2) 총사업비 지침에 따른 설계 적정성 검토를 위한 도서(계획/중간/실시)

3. 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

가. 업무보고

1) 주간 공정보고

매주 월요일 오전10시까지(협의 후 변경가능) 붙임 “서식 5”에 의거 제출한다.

2) 월간 공정보고

매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 “서식 6”에 의거 매달 첫째 월요일까지 제출한다.(주간 공정보고 포함)

3) 수시 보고

설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 발생 시마다 제출하여야 한다.

4) 계획, 중간, 실시설계 단계별 중간 및 완료보고회

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업지지서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성   있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 하며, 별도로 회의록을 작성(녹음파일 및 출력물, 출력물은 반드시 서명필) 제출하여야 한다.

마) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지정/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

- 업무착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

- 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 하며, 관계자의 질의에 답하여야 한다.

3) 중간 보고회

- 설계자는 기본설계 완료 후 7일 이내에 발주기관과 사전협의를 거친 후 설계  보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

- 중간 보고회는 책임기술자가 기본설계 내용을 토대로 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

4) 최종 보고회

- 설계자는 용역완료 15일전에 발주기관과 사전협의를 거친 후 최종보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

- 최종보고회는 책임기술자가 실시설계를 토대로 설계의 전반적인 내용을 설명  하여야 한다.

5) 수시회의

- 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해관계자 회의. 각종 심의 및 자문회의를 할 수 있으며, 설계진행 중 문제점이 발생하거나, 기본설계 및 실시설계 보고회의 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

- 계획설계 및 실시설계 중 공사비가 공사예산을 초과할 시에는 필히 전 공종   담당자 및 견적 담당자가 합동회의를 통한 감축방안 및 원가의 적정성 검토보고서를 제출하여야 한다.

6) 기타회의

- 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 주민설명회, 이해관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 회의를 개최 할 수 있으며, 이때 설계자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

- 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에 별도 통보할 수 있다.

4. 보안성 검토

가. 설계자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 설계자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계 제출 시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리해야 한다.

4) 과업수행자는 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생하는 모든 책임은 설계자가 진다.

제3장 설계 일반 지침

1. 일반사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신, 폐기물, 기타 부대공사에 대한 설계는  관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

라. 사전조사를 철저히 하여 지반상태 및 기존건축물을 확인하고 기존 도로 등과 연계하여 설계해야 하며 사전조사 시 도로의 연결관계, 지반상황(지하 또는 지상의 지장물 포함), 우․오수관 위치, 급수인입점, 전기인입점, 통신선 인입점 등은 물론 과거의 기상 관련 통계자료를 확보 수집, 검토하여 설계에 반영하여야 한다.(현황측량 자료 발주처 제공)

마. 본 사업과 관련하여 특별히 고려하여야 할 사항

1) 기 조성된 토지이용계획을 바탕으로 거주자의 생활패턴을 고려한 거주공간과 지역의 정취가 살아있고, 편리한 생활인프라를 고려한 외부공간을 조성한다.

2) 기 설계된 주차공간, 조경공간, 경작지, 휴게공간 등 연계를 고려하고, 이용자의 편의성 및 유대감 강화 등을 고려한 내·외부 동선을 계획하여야 한다.

3) 본 시설이 입지할 지역의 교통체계와 주변 토지이용계획을 감안하여 배치계획을 수행하며, 장애인 및 노약자가 안전하고 편리하게 접근할 수 있도록 하며 보행동선, 주차계획, 옥외 공간활용계획 등이 합리적이고 경제성을 고려한 시설물 배치가 되도록 한다.

바. 장애인 등에 대한 편의시설은 법에서 정한 기준 이상으로 설계하여야 한다.

사. 자재 및 장비선정 시 설계의 의도를 벗어나지 않는 한 신기술제품, 조달청 우수  제품 등의 사용을 검토하여야 한다.

아. 건축물의 미적요소를 갖추어 안정성, 경제성, 시공의 난이성 및 기능의  합리성이 검토 되어야 하고 조형미의 구현에 합당하도록 설계하여야 하며 지나친 외관치장을 가급적 피한다.

자. 공사에 필요한 가설전기 및 가설 사무실을 계획하여 건축내역에 반영한다.

차. 본 사업 집행이 예산 범위 내에서 집행될 수 있도록 적정하게 설계하여야 한다.

카. 기타 발주기관 요구사항을 면밀히 검토하여 반영하여야 한다.

2. 분야별 설계일반지침

가. 건축

1) 건축설계 일반사항

가) 건물의 배치

① 본 과업은 기존 건축물을 존치하여 리모델링하는 사업과 신축사업이 함께 진행되므로, 기 조성된 외부공간(대지경계 띠조경)과의 합리적인 연계를 고려하여야 한다.

② 건물의 배치는 자연 조망, 채광, 환기를 고려하여 쾌적한 환경이 조성되도록 한다.

③ 각 시설물의 진입이 기 조성되는 차량 및 보행통로와의 연계를 고려하여햐 하며 주차장과의 접근성을 고려하여야 한다

④ 본 시설물이 주거시설임을 고려하여 적절한 향 및 조망을 확보하여 이용자의 만족성을 제고한다.

⑤ 출입구의 위치는 대지의 형태, 방위, 특히 도로와의 관계에 따라 결정한다

⑥ 각종 편의시설 및 위생시설은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진에 보장에 관한 법률」 등에서 정한 기준에 적합하게 설계한다.

⑦ 기계설비, 기계소방 P/D실(파이프덕트실)은 준공 후 설비시설의 유지관리가 가능하도록 구획하고 출입이 가능 하도록 한다.

⑧ 기계실 또한 각종 설비규모의 바닥면적을 계산하고 장비기초(패드)가 누락되지 않도록 하며, 장비설치 공간이 협소하여 준공 후 시설보수 등 유지관리가 어렵지 않게 여유 공간을 확보한다.

⑨ 부지 북측에 위치한 기존의 복지회관과 남측에 별동으로 청년문화센터를 이격하여 배치함으로써, 2, 3층의 주거공간(기숙사)의 프라이버시를 보호할 수 있도록 한다.

⑩ 복지회관에는 편의점과 식당의 주방 창고에 가까운 북측에 서비스차량의 하역을 위한 공간을 배치하도록 한다.

⑪ 대지와 15M도로 사이의 레벨 차가 있어, 기존의 출입구를 활용하여 보차 공용 출입구로 활용하되, 대지 내에서는 차량 동선을 대지 외곽쪽으로 배치하여 보차분리를 꾀하고, 두 건축물 사이의 외부공간을 충분히 활용하도록 한다.

⑫ 청년문화센터와 복지회관의 건물 주출입구는 서로 마주보며, 외부공간으로 직접 연결되도록 한다.

⑬ 기존의 외부 체육시설을 일부 철거하게 되므로, 건축물이 배치되지 않은 곳은 야외체육시설(운동기구/ 야외그늘막 등)을 배치하고, 대지 주변의 기존 조경을 활용하여, 대지 내의 야외 조경공간과 연결한다.

⑭ 차량동선은 대지 외곽으로 배치하고, 주차는 장애인 주차 2대를 포함하여 모두 15대를 설치함으로써, 법정 주차대수인 5.49대보다 늘려, 외부방문자들의 주차편의를 고려한다.

⑮ 기타 발주자와 협의를 통한 요청사항을 반영한다.

나) 평면계획

① 공통

(가) 실의 형태 및 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치(장․단변비)는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획한다.

(나) 공유할 수 있는 공간은 최대한 같은 존으로 계획하고, 가변적 공간모듈을 적용하여 가변성, 확장성을 고려한 공간계획을 해야 한다.

(다) 평면은 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등의 새로운 이미지를 느낄 수 있도록 계획하며, 실내 공간 활용의 효율성을 도모하도록 한다.

(라) 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위공간(장애인용 화장실 등)을 계획

(마) 재난 발생 시 방화구획과 피난동선 및 시설계획을 고려하여야 한다.

② 청년문화센터(별동 증축) 평면계획

(가) 1층의 실내운동시설과 북카페는 가능하면 외부공간과 연계 혹은 조망을 고려하여 실배치

(나) 1층의 공간은 청년문화센터 상부 기숙사 거주자 뿐만 아니라, 복지회관의 식당 이용자와 회의실을 방문하는 기업들과 방문객도 이용 가능

(다) 북카페 한쪽에 (가변형 폴딩도어 등으로) 소그룹강의실을 설치하여, 외국인 근로자들의 한국어 소그룹 수업 등에 활용 가능하도록 관계자와 협의하여 배치

(라) 3층은 향을 고려하여 10개의 기숙사 1인실을 배치한다.

(마) 2층은 향을 고려하여 6개의 기숙사 1인실을 배치하고, 공유주방과 세탁공간을 배치. 공유주방은 환기를 고려하고, 외부의 발코니등과 연계하여 숙실 거주자의 다양한 커뮤니티 활동에 활용할 수 있도록 한다.

(바) 피트니스 공간에는 간단한 탈의 및 샤워 공간을 설치하여 외부인의 활용 용이

(사) 상대적으로 소규모의 개인숙실의 답답함을 해소하기 위한 공용공간을 다양하게 배치

(아) 사용자의 특성을 고려한 기숙사 평면계획(수납 및 이용효율성을 고려한 가구배치 고려) - 위생기구 및 주방기구 설치공사의 공종별 내역 적용하여 누락되지 않도록 유의 바람

③ 농공단지 복지회관 (리모델링) 평면계획

(가) 노후화된 지붕재 교체 및 옥상 방수공사로 기능적인 리모델링 고려

(나) 지붕계획시 외장재 및 창호자재 색상과 조화로운 입면 계획

(다) 1층에는 설문조사에서 가장 많이 나온 편의점 설치

(라) 식당과 편의점의 하역차량을 고려하여 하역공간에서 바로 접근할 수 있도록 창고와 주방 등 배치

(마) 식당과 휴게공간 및 야외 데크를 인접하게 배치하여, 다양한 활용고려

(바) 2층에는 평상시 농공단지 협의체 이사회 등 회의와, 대규모 강의에 활용할 수 있도록 하고, 대회의실 앞에 접견실과 라운지 배치하여 해외 바이어 접견 및 중규모 회의가 가능하도록 계획

(사) 필요시 대회의실 무빙월 등으로 분할하여 사용하는 것 고려

(아) 2층 대회의실은 회의실/라운지/통로 등과 함께 오픈가능하도록 계획하여, 다수인원을 수용가능한 공간계획으로 고려한다.

다) 입면계획

① 입면은 시설의 개방감과 자연채광, 환기 등 실내환경, 에너지 효율 등을 충분히 고려하여 계획한다.

② 입면은 주변환경에 적합하고, 지역성을 고려한 독창적인 디자인을 적용하되, 불필요한 장식적 요소는 지양하며, 미적 감각을 지닌 간결하고 세련된 디자인을 제시한다.

③ 사용재료는 친환경적이고, 내구성 및 유지관리가 우수한 재료를 적용한다.

④ 색채계획은 주변과의 조화를 고려하여 선정한다.

⑤ 부지 내의 두 동의 입면 계획 및 재료에 있어서 서로 조화롭게 적용한다.

라) 단면계획

① 실의 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 층고계획이 되도록 계획한다.

② 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평 동선을 계획한다.

③ 이용자의 편의를 고려한 동선계획으로 장애인, 노약자 등의 이동에 불편이 없도록 적합하게 계획한다.

④ 장비 및 물품 반출입에 있어 합리적인 기능성과 안정성이 확보되어야 하며, 원활한 이동이 가능하도록 동선계획을 수립하여야 한다.

2) 구조계획

가) 건물의 골조는 건물의 기능, 규모, 경제성, 안전성 시공성 등을 검토하여 가장 합리적인 구조방식을 선정한다.

나) 지진에 대비한 내진설계를 하고 법에서 정한 규정을 반드시 지켜야 하며, 각 실의   기능을 고려하여 충분한 하중을 견딜 수 있는 구조로 계획한다.

다) 지질조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

라) 구조계산은 객관성이 있는 국내외 관계 규준을 적용하여야 하며, 적정성 여부에 대한 발주기관의 승인을 득한 후 구조 계산에 착수하여야 한다.

마) 구조 안전은 관계법에 따라 전문가의 확인을 받고, 사용하는 건축 재료의 품질은 관계법에 따라 공인된 것이어야 한다.

바) 복지회관 구조진단 결과를 고려하여, 일부 벽체 철거 및 구조 보강에 대하여 고려 (2024년부터 건축물의 설계도서 작성기준이 변경되어 구조도면에 대한 작성과 책임이 구조기술사에 있는 것으로 변경되었으므로, 구조도면에 대한 책임날인이 될 수 있도록 하기 바람)

사) 지하수조 설치시 기초 받침대의 재해발생시 내진대비 장비기초콘크리트 설치

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용한다.

나) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

다) 관급자재 및 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영한다.

4) 기타 유의사항

가) 공사비는 예정 총공사비 이내로 계획하여야 한다.

나) 에너지절약 등 차원에서 전체벽면이 유리로 된 커튼월 구조는 지양한다.

다) 납품이후 각종 행정절차에 따른 자료작성 등 업무협조 및 설계하자 관리방안을 제시하여야 한다.

라) 숙실의 가구 배치계획을 고려한다.

나. 토목

1) 일반사항

가) 기 조성된 접근로와 외부공간을 숙지하여 조화롭게 연계되도록 계획한다.

나) 현장의 자연적인 지형조건 검토, 토목공사량이 최소화 되는 방안으로 계획한다.

다) 본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

라) 설계에 임하기 전에 설계자는 반드시 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 배수 상황 등 제반 주변 사항을 조사하여 경계를 확정하고 조사 내용은 기본설계에 반영 한다.

마) 일반 토목 설계 법규 및 지침, 건축허가 협의사항 등을 준수하여 설계에 반영하고, 토공사로 인하여 주변 건축물 및 시설물에 대한 피해가 발생되지 않도록 주변현황을 철저히 조사하여 안전성을 검토 후 이에 대한 조치를 전문기술자가 확인하여 설계에 반영하여야 한다.

바) 획일적 설계를 지양하고 현장 상황에 부합되고 현실적으로 사용되는 경제적인 토목공종, 장비 및 자재 선정으로 적정한 품질확보와 경제적 설계가 되도록 한다.

사) 사전에 지질, 지반 및 지하구조물 등의 제반 여건을 면밀히 조사하여 구조   계산에 반영하여야 한다.(지반조사보고서 – 지반조사비용은 발주처 실비정산)

아) 상⋅하수도 계획 수량을 충분히 고려하여 설치되어야 한다.

2) 토공사 및 흙막이 설계 (필요시)

가) 토공은 가급적 절토, 성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치  하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

나) 설계자는 토공설계 군 토취장 또는 사토장을 토석정보공유시스템을 이용하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

※ 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치의 검토를 충분히하여 경제적인 설계 및 대안을 수립하여 설계하여야 한다.

다) 건설기계 선정시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

라) 흙막이설계 필요시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

마) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지질조사 결과 또는 학회 발표자료 등 객관적 근거를 기초로 작성하여야 한다.

바) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여서는 계측기의 종류 및 설치 수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

사) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주자와 감독관과 협의하여 결정하여야 한다.

아) 본 대지는 건물의 부동침하가 발생치 않도록 하여야 한다.

자) 토질의 화학적 특성을 감안하여 내부식성 말뚝을 선정하고 부득이 강관 말뚝을 선정할 경우에는 양호한 방식 대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

차) 말뚝박기공사에 따른 소음, 진동, 분진 등에 의한 주변지역의 민원을 최소화 할 수 있는 최신 공법을 적용한다.

카) 붕괴, 파괴, 과대한 변형을 방지할 수 있게 안전하게 설계하고, 공기가 최소화 되도록 경제적으로 설계하여야 한다.

3) 구내 우 ․ 오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록   하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150㎜ 이상이 되도록 한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

바) 우⋅오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

사) 환경부 제정 하수도 시설기준에 의하되 기존 배수시설을 충분히 조사한 후   우⋅오수량 추정과 배수방식 및 유량계산을 실시하고 설계 시 사업시행에   차질이 없도록 하수도 관리청과 사전 협의하여야 한다.

6) 상수도

가) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

나) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

다) 상기에 명시되지 않은 사항은 수도법 및 환경부 제정 상수도 시설기준에 따른다.

7) 기  타

가) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

나) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

다) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호 방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

라) 사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영한다. 필요시 토량이동 계획도를 작성한다.

마) 토목공종은 사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위해 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계 시 반영하고 아래의 내용을 포함하도록 한다.

- 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책

- 구조물 시공 시 안전대책

- 우기 및 동절기 안전대책

- 유지관리 종합안전 대책 등

다. 조경

1) 현재 실시설계 진행 중인 조경 및 외부공간에 관한 내용을 면밀히 검토하고, 상호 연관관계를 예상하여 조경 설계 시 이질감이 없도록 계획하여야 한다.

2) 일반사항

가) 부지의 특성과 토양 및 주변 수종 등을 감안하여 설계에 반영하여야 하며 조경은 건물의 성격과 조화되도록 계획하여야 한다.

다) 오염에 강하고 계절감이 있는 수목구성으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

라) 병충해, 전정, 동절기 보온 등 유지관리가 용이하고 해수에 강한 수목을 선정 한다.

마) 조경관련 시설물 등에 대하여는 위치, 규모, 재료, 수량, 내구성, 질감, 구조 등을 충분히 고려하여 디자인하고 이용자의 휴식 등을 위한 인공구조물을 설치하되, 주변지형, 단지내 지형, 시설물 등과 조화를 이루도록 한다.

바) 외부공간은 이용자의 정서 함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이   가능한 친숙하고 편리한 공간으로 구성하며 충분한 휴식공간과 녹지를 확보 하여 조성한다.

사) 대상지 내 기존 수목이 일부 존재하므로, 기존수목에 대한 조사 및 활용방안 제시하기 바람.(대지경계부분 띠조경 등 고려)

3) 조경수목

가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 조경수 식재구역의  토사를 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

다) 단지 내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

라) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 충분한 이격거리를 확보하여야 한다.

마) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

4) 조경시설물

가) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

나) 조경 포장이 있는 경우에는 친환경적인 재료로 기존 시설 및 자재와 융합이 이루어지도록 사용하여야 한다.

다) 벤치, 등의자, 파고라 등 시설물은 해당지역의 조례에 의하되 주민들의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

라) 필요에 의하여 옥상정원 조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 구조안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려 하여야 한다.

라. 기계설비

1) 기계설비 일반사항

가) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.

나) 기본조사(급수, 가스, 오폐수처리시설 등)를 하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 냉난방 설비, 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주자의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

라) 각종시설은 중앙집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영, 관리가   가능하도록 설계한다.

마) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방안 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

바) 2024년 기계설비 품셈이 배관보온 및 덕트에 관한 내용이 개정되었으므로 내역서 적용 및 확인하여 누락 되지 않도록 한다.

2) 기계설비 일반지침

가) 냉난방 설비

- 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

- 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.

- 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 용이하게 설계함을 원칙으로 한다.

- 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

- 동파방지 및 결로 방지에 대한 대책을 강구하여 설계에 반영한다.

나) 위생설비

- 급수, 급탕방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영한다.

- 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

- 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

- 위생기구는 K.S. 제품 또는 동등 이상 품을 사용한다.

다) 소화설비

- 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물안전관리법 등의 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

- 유사시 원활한 소방활동을 위한 충분한 공간을 확보하도록 설계한다.

- 시공시 임시소방시설 적정 비치하여 화재예방 및 안전사고 방지 철저히 한다.

- 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계한다.

라) 자동제어설비

- 자동제어설비는 각 건물 규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요 장비에 대한 제어 등 운영관리 상 필요한 각종 자료의   지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 설계함을 원칙으로 한다.

마) 장비 성능을 최상으로 유지, 에너지절약, 소음방지 등을 위한 T.A.B를 반영한다.

바) 기타 관련법규 및 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 하며, 세부설계지침은 발주자와 협의한다.

사) 승강기는 장애인용과 겸용으로 한다.

아) 기계설비 반입구를 반드시 계획한다.

자) 장애인⋅노인⋅임산부 등의 편의증진에 관한 법령에 적합토록 설계한다.

마. 전기설비

1) 전기설비 일반사항

가) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

나) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

다) 각 시설물의 용량 및 설비를 검토한 후 전기설비기술 기준에 적합하게 설계  하여야 한다.

라) 한국전력공사와 협의 고품질의 전력을 공급하기 위한 한전인입분담금 및 전기 사용전검사 수수료를 산출한다(순수공사비에서 제외  수요기관 부담)

마) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

바) 각 설비별로 내진 대책을 세워 반영한다.

2) 전기설비 공종별 지침

가) 수전설비

- 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

- 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

- 한전전원 인입점(수급지점) 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

- 전산 및 정보통신 기기 공급용 무정전 전원장치 (U.P.S) 및 비상 전원에 대한 예비전원과 간선 구성을 검토 반영한다.

나) 동력공사

- 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정하여야 한다.

- 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

- 역률보상 방법과 계통을 검토한 후 역률개선용 콘덴서를 부착하는 방안을   설계에 반영한다.

- 동력제어반의 형태와 구성, 설치 공간 등을 검토한 후 설계 반영한다.

다) 조명설비공사

- 조도 기준 설정 및 조도 계산서를 작성하여야 한다.

- 용도에 적합한 등기구를 선정한다.

- 에너지 절약형 등기구 선정 및 배치

- 각 실별 천장 재료에 걸맞은 고효율 에너지절약형 조명기구를 선정하고, 적정한 조도를 유지 할 수 있도록 등수를 검토 설계한다.

- 옥외 보안등의 설치 높이를 4.5M 이하로 한다.

- 옥외주차장, 부지 외곽 보안등은 현지 여건에 알맞게 계획되어야 하며, 야간의 내･외부 조명에 대하여도 검토 반영하여야 한다.

- 계단은 인체 감지형으로 보행자가 있을 때만 점등되도록 설계하여 에너지절약을 기하여야 한다.

라) 전열공사

- 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

- OA System에 부응하는 안정된 전원공급 방안을 검토하여 반영한다.

- 대기전력 차단시스템 검토

마) 피뢰침 및 접지설비

- 피뢰 및 접지설비는 관련법에 의거 설치한다.

- 피뢰방식 및 기타 건물보호를 위한 구체적인 방안을 검토 설계한다.

- 피뢰침의 보호각을 검토하여 설계한다.

- 전산용 접지는 1종 단독접지 또는 공통접지로 접지저항을 최소로 한다.

- 전기시설 접지와 통신 방송시설 접지는 시설의 안전을 위하여 충분한 이격  거리를 확인 설치할 것.

바) 소방설비공사

- 자동화재 탐지설비는 타 설비와의 관계를 검토 설계한다.

- 수신기 및 기타 발신기 등을 검토 설계한다.

- 소방 관련법에 적합한 설계를 하여야 한다.

(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등)

- 각종 소화설비에 따른 감시 및 유지관리의 편의를 도모하여야 한다.

바. 정보통신

1) 일반사항

가) 시설 및 사무실의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다.

나) 유지관리의 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다) 설계시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

라) 설계시 장래 시설확장에 대한 고려를 하여야 한다.

2) 정보통신 일반지침

가) 통합배선설비공사

- 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

- 통신실의 설치조건 및 위치를 검토하여야 한다.

- 통합배선 구성방식 및 전화/LAN 수구 적정수량을 검토하여야 한다.

- MDF/IDF(필요시) 위치 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

- 정보통신시설(필요시)은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

- 유지보수가 용이하도록 설계하여야 한다.

- 기타 관련법에 정하는 설비 검토 설계 및 위반됨이 없이 적용

나) 약전설비공사

- 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

- MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

- 향후 위성방송설비의 사용에 대한 인프라구축을 검토 설계한다.

- OA기기, 집무형태의 변화 등 모든 상황에 대응 가능한 설비로 구성

다) 기타설비

- 출입통제설비 및 CCTV설비는 수요기관과 협의하여 적정설비 설계가 되도록 한다.

- 기존 통신장비의 재사용 및 호환여부 등 수요기관에 필요한 정보통신설비는 협의하여 적절하게 반영하여야 한다.

※ 기타 건축설계공모 지침에 명기된 설계지침 내용을 충실히 반영한다.

3. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 기계설비, 조경 포함), 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 공종별로 분리   하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출서 등)

나. 발주단위에 대하여는 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다. 폐기물처리도서 분리여부는 발주자와 필히 협의하여 결정하여야 한다.

4. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

공 종	건축	건축구조	토목	조경	기계	전기	통신	소방기계	소방전기
기 호	A	S	C	L	M	E	ET	MF	EF

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 사용자재의 설치 상세도 작성후 관련 평면도에 명기

3) 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

4) 각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명기

5) 각종 부착물 및 부품에 대한 명시

6) 특수공법에 대한 공인기관의 기술검토 보고서 첨부 및 설명서(상세도)의 작성

7) 도면이해를 위한 주기사항 및 시공시 유의사항을 명시

8) 부호, 방향 KEY PLAN, GRAPHIC SCALE, ROOM NAME 등

9) 계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

10) 계통설명도

11) 수량집계표

12) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

13) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

14) 기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

5. 도면작성 및 서명

가. 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한  축적으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종합보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 구조도면 및 구조계산서에는 구조기술자가 필히 서명, 날인하여야 한다.

제4장 설계도서 작성요령

1. 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 기획업무 내용에 따라 현장조사 및 자료 수집내용을 근거로  건축물의 규모, 예산, 기능, 품질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 단계로 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등)의 기본시스템을 검토하여 발주기관의 요구조건을 반영한 계획(안)을 발주기관에 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반 사항

1) 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 수급인은 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행 하고 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완 제출하여 발주  기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 계획설계(안) 작성 시 포함 사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선  계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변 도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치 계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리 계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경 계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 측량성과도

9) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(국내·외 유사시설 조사 분석자료 등)

라. 현장조사 방법

1) 현장조사는 관련 문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원,  등기부등본, 지방자치단체 조례 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하 매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장 조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관  하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리 방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시  기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위 경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사 보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

2. 중간설계

가. 정의

- “중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라  함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주 기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을  제시하여야 한다.

4) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조   계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주  기관의 승인을 받는다.

다. 설계도서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패  사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비 관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면 종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공 방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리 계산서

- 구조계산서 (옹벽, 가시설)

- 수리계산서

- 절(터파기)⋅성토 사면안정성 검토서

다) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

라) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간 설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입 방식 및 인입 지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치,   결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

3. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 계획설계 및 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계 도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질,  질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고  최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정  하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 용도, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률,  주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

엘리베이터 대수, 오수정화조규격 및 용량

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황, 기존건축물 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등(축척 : 임의)

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도, 단위 평면도

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 각 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 계단 평 ․ 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥 ․ 보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

2) 토목

가) 설계설명서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행내용, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 시방서

라) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

3) 조경

가) 설계설명서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행내용, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계설명서

냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비에 대한 설명

- 수전 설비도에 대한 채택 설명 : 전력인입에 대한 경제성 및 안전성에 대한  검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 계산기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수변전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서(필요시)

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법,   주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수전설비도 : 수전설비의 평면도(결선 포함)

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로   표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의  사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로,통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의  계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등  통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

7) 소방

가) 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 설비풍량계산서, 소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	1	부	신재생 에너지 적용계획 포함
2	현장조사보고서	A4	1	부	유사시설견학보고서 포함
3	관련법규 검토서	A4	1	부	전공종
4	공사비 검토서	A4	1	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 설계공모 심사위원의 지적사항 / 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영) 결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 USB로도 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 (반접이)
3	내 역 서 (관급내역서)	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
4	계산서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시방서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방 포함
6	조감도		1	매	◯							파일제출

※ 기본설계보고서, 설계도면 및 내역서는 전 공종 포함 전체본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종합보고서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
4	각종 계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	일반시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	유지관리지침서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
14	조감도		1	부	◯							표구 포함 (0.9m*1.2m이상 1부)
15	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
16	USB		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
17	건축물 에너지 절약계획서 및 관련 증빙서류
18	설계안전성검토보고서
19	설계안전보건대장											해당시
20	신·재생에너지 설비 설치계획서											해당시
21	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	건축,기계,전기․통신,소방 관급도면(A3반접) :3부 추가 계약심사용도서 :2부

※ 1. 조감도는 제출시 별도로 A1 규격 1매와 원본File을 USB로 제출

2. 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주시 별도 제작 제출

3. 계약심사 제출용도서 및 계약심사 결과를 반영한 발주용도서 제작 제출(기타 발주기관 요구사항)

4. 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

나. 종합보고서

종합보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체   기재하여 A4 규격으로 제출

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성하여 종합보고서에 포함하여 제출하여야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

마. 조감도(A1 이상, 표구 포함)

바. 기타 발주자가 요구하는 성과품

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :

2. 계약  일자 : 2025.   .   .

3. 착수  일자 : 2025.   .   .

4. 완수예정일 : 2025.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그  증거로서 이 각서를 제출합니다.

본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등)제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2025년    월    일

주    소 :

생년월일 :

기술분야 : 참여공종 표기

성    명 :                  (인)

군위군수 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책임 기술자 선임계

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 2025.   .   .

4. 착수  일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

-  아            래  -

가. 성    명 :

나. 주    소 :

다. 생년월일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

군위군수 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급 승인 요청서

1. 용  역  명 :                   사업 건축설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2025.   .   .

4. 착수  일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

-  아            래  -

가. 하도급 분야 : (구조계산, 건축기계설비, 토목, 조경 등)

나. 하도급 금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

상기인에게 ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

군위군수 귀하

〔붙임 4〕(기본, 실시)설계 검사원

(기본, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                    사업 건축설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2025.   .   .

4. 착수일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

2025.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

군위군수 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간 공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

- 현장위치 :

- 용역기간 : 2025년  월  일 ～ 2025년  월  일

- 계약금액 :

□ 용역진행사항(□계획설계, □중간설계, □실시설계) ← ■ 구분 표시

구 분	전주진행사항(20 . . .)			금주예정사항(20 . . .)			비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기
공정률	계획	실적	대비	계획	실적	대비

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

군위군수 귀하

〔붙임 6〕월간공정보고

월간 공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역개요

- 현장위치 :

- 용역기간 : 2025년  월  일 ～ 2025년  월  일

- 계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

군위군수 귀하

[붙임 6]

건축 설계도서 내역반영 확인서

〇 사 업 명 :

〇 사업개요

- 위    치 :

- 대지면적 :

- 규    모 :  지하  층  /  지상  층  /    동

- 연 면 적 :

- 사업내용 :

- 총사업비 :

〇 설계용역 개요

- 설 계 자 :

- 설계기간 :

- 계약금액 :

위 사업의 설계도서 내용이 내역서에 적정하게 반영되었음을 확인하였으며, 현장 불일치와 내역서 미반영 등으로 설계변경 요인이 발생 할 경우 어떠한 행정조치도 감수하겠습니다.

2025년   월     일

설계자             직인

군위군수 귀하