- 남부권장애인복지관(경기마음케어팜) 건립 -

기본 및 실시설계용역 과업지시서

2023. 09.

	이 천 시
	회 계 과

-  목          차  -

제1장 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 개요	1

4. 과업의 범위	2

5. 과업의 준수사항	3

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	5

2. 업무보고 및 회의	8

3. 관급자재의 선정	9

4. 녹색(친환경)건축 인증	10

5. 설계의 경제성 검토 VE	10

6. 설계자문위원회 자문·심의	10

7. 건물에너지효율 등급	11

8. 장애물 없는 생활환경 인증	11

9. 제로에너지 건축물(5등급) 인증	11

10. 신재생에너지 공급 설계	11

11. 하도급 범위	11

12. 보안성 검토	12

제3장 설계수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	12

2. 설계 일반 지침	13

3. 설계진행 시 유의사항	16

4. 설계도서의 분리작성	18

5. 설계도서 표기	18

6. 도면작성	18

제4장 기술 지침

1. 공통사항	19

제5장 설계도서 작성요령

1. 공통사항	27

2. 계획 설계	28

3. 기본(중간) 설계	28

4. 실시 설계	34

제6장 설계도서 납품목록

1. 기본(중간)설계 납품도서	42

2. 실시설계 납품도서	43

【부록】

〔붙임 1〕 보안각서	45

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계	46

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서	47

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원	48

〔붙임 5〕 주간공정보고	49

〔붙임 6〕 월간공정보고	50

제1장  총  칙

1. 과업의 명칭

남부권장애인복지관(경기마음건강케어팜) 건립 기본 및 실시설계용역

2. 과업목적

최근 우울증으로 인한 자살·정신질환자들에 의한 범죄 증가 등 마음건강취약 계층에 대한 사회적 우려가 고조됨에 따라 국가와 지자체의 책임이 강조돼는 사항으로 마음치유에 효과적인 치유농업을 접목한 새로운 복지서비스 제공을 위해 진암근린공원 내 장애인복지관을 건립하여 장애인, 비장애인 등을 위한 프로그램을 병행 운영하므로써 이용자들의 인식을 개선하고 사회통합에 기여하는 등 마음건강케어가 시급한 우리시민의 건강증진과 삶의 질 향상을 목적으로 하는 사업임.

3. 과업의 개요

가. 대지위치 : 이천시 장호원읍 진암리 99-2번지

나. 대지면적 : 9,681㎡

다. 건물규모

1) 신축규모 : 연면적 4,240㎡ (± 5%내외, 공사비 범위 내 조정 가능)

2) 용    도 : 노유자시설(장애인복지관)

3) 지역지구 : 자연녹지지역, 근린공원 (건폐율 - %이하, 용적률 - %이하)

4) 주요시설 : 장애인복지관(마음건강케어센터), 장애인주간보호센터, 농업· 화훼치유시설 등

5) 건물규모 및 시설별 면적은 설계과정에서 수요기관(이하 “발주기관”이라 한다)과 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 협의하여 조정 될 수 있다.

라. 공사비 예산액 : 13,934,760천원(부가세 포함)

- 부지조성공사비 : 319,000천원(부가세 포함) 별도

1) 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거, 폐기물 처리비 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함하여야 한다.

※ 낙찰차액을 감안하지 말 것(공사예정가격이 예산을 초과할 수 없음).

마. 과업기간 : 착수일로부터 240일(8개월/ 기본설계 60일, 실시설계 180일)

※ 성과품 납품완료시까지며 공휴일을 포함한다.

1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등  발주처의 요구에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 발주기관이 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

-「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제14장

(가) 지용역계약 일반조건 제7절의 “2”(계약기간의 연장)

(나) 용역계약 일반조건 제7절의 “6”(용역의 일시정지)

(다) 용역계약 일반조건 제8절의 “8-가”(불가항력)

(다) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

(라) 수요기관의 사업비 조달 계획에 따른 용역기간 조정 요청 시

4. 과업의 범위

가. 본 과업은 기본(중간)설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인·허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의, 실시계획의 인가 등을 포함한 인·허가 처리.

(설계용역 성과물은 제반 인·허가를 득한 성과물이어야 함)

1) 건물에너지효율 1++등급 인증 취득

2) 녹색건축물 “우수등급(그린2등급)” 이상의 인증 취득

3) 장애물 없는 생활환경(B/F) 일반등급 이상 예비인증 취득

4) 제로에너지건축물 (ZEB 5등급) 인증 취득

5) 「녹색건축물 조성지원법」에 의한 에너지 절약계획을 고려한 설계

6) 「신에너지 및 재생에너지 개발⸱이용⸱보급촉진법」을 준수한 설계

7) 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증기준」을 준수한 설계

8) 「빗물 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」을 준수한 설계

9) 각종자문, 설명회, 설계안전성 검토, 설계VE(기술자문포함) 지하안전영향평가, 교통‧환경영향평가, 유혜·위험요인의 감소방안을 포함한 설계안전보건대장 작성 등 현상공모로 인한 건축계획 변경에 따른 실시계획인가 변경협의, 공원조성계획 변경협의,  소규모재해영양평가 변경협의 등 관련법령 해당 시 서류 작성 및 절차 이행

10) 건축 설계공모 후에 공원조성계획, 소규모재해영향평가, 도시실시계획인가 변경 등이 있을시 과업에 반영

11) 기타 공사를 수행하는데 필요한 일체의 설계도서 등의 작성

나. 총사업비 설계검토업무 : 설계의 적정성 검토, 설계의 경제성 등 검토(VE), 설계변경 타당성 검토(필요 시) 등 총사업비 관련 설계검토업무의 도서작성 및 업무 지원.

다. 주민설명회, 설계보고회 등에 대한 업무수행, 건축협의와 관련된 도서작성 및 업무대행, 설계자문심의, 건축심의, 공공디자인심의, 건축협의, 등 각종 심의에 필요한 조감도 및 투시도 등 서류작성 및 업무대행 등 발주기관이 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함, 사업추진 및 각종 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원.

※ 자문 및 협의에 소요되는 모든 제비용은 용역수행자 부담으로 한다.

라. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는데 있어 발주기관(설계감독관)이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성.

마. 공사 완료시 준공도서의 작성 등을 요구할 경우 이에 응해야 한다.

바. 공사 설계변경에 따른 건축협의 변경 및 건축물관리 대장 작성 등을 요구할 경우 이에 응해야 한다.

사. 설계자가 건축물의 건축과정에 지속적으로 참여하여 발주처, 시공자, 감리자 등에게 설계의 취지 및 건축물의 시공, 유지⸱관리에 필요한 사항을 제안하는 설계의도구현 업무

공사전	공사중	공사완료
- 설계도서의 해석 및 의도 전달	- 주요 공정 및 품격과 관련된 공정 참여 - 자재와 장비의 확인, 선정 - 시공 상세도의 검토 및 확인 - 전기 등 설비 설계 엔지니어와 협의, 조정 - 설계변경에 대한 협의, 자문 - 인테리어 디자인업무 자문 - 디자인자문단에 설계의도를 반영한 디자인안 제출	- 유지관리 제안 - 설계의도구현 완료보고서 제출 - 준공보고서 및 감리완료보고서 서명

아. 수급인은 각종 예비인증서(녹색건축물, 건물에너지 효율등급, 제로에너지 건축물, BF인증 등)를 용역완료 전에 득할 수 있도록 노력하여야 하며, 부득이한 경우에는 용역완료 이후에 득하여 제출하여야 한다.

자. 기타 필요시 사례 비교조사 제출 및 본 사업 적용‧반영 사항 등

5. 과업의 준수사항

가. 본 과업지시서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항, 건축법 등 관련 법률 등이 없는 한 본 과업지시서를 원칙으로 하고, 이의가 있을 때에는 서면질의에 의하여 확인 후 수행한다.

나. 설계자의 참가자격

1) 건축사법에 의한 건축사 면허소지자로 같은 법에 따라 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자

단, 외국의 건축사 면허(자격)을 가진 자는 「건축사법」제23조의 규정에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함.

2) 당선자는 계약 시 기계․전기․정보통신․소방․조경․토목(토질지질) 설계자격이 없는 경우 기계·전기·정보통신·소방 관련 법령 등 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링활동주체 신고를 필한 자와 공동도급(분담이행)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

3) 전기분야 설계용역 과업의 자격

「전력기술관리법」 제11조에 의한 유자격자가 설계하여야 한다.

4) 정보통신분야 설계용역 과업의 자격

「정보통신공사업법」에 의한 설계유자격자가 설계하여야 한다.

5) 소방분야 설계용역 과업의 자격

「소방시설공사업법」제4조 및 동법시행령 제2조 및 별표1에 따라 전문소방시설 설계업 또는 일반소방시설설계업(기계‧전기) 이상 등록한 자가 설계하여야 한다.

6) 조경분야 설계용역 과업의 자격

조경설계는 기술사법에 의한 기술사사무소(조경) 또는 엔지니어링산업 진흥법에 의한 엔지니어링 활동 주체(조경)에서 도면 작성ㆍ날인하여야 한다.

7) 건축구조, 토질 및 기초 설계용역 과업의 자격

「기술사법」 제6조 제1항 및 동법 시행령 19조에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 「엔지니어링산업진흥법」에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필하고, 해당 기술사를 보유한 업체로 건축구조분야, 토질 및 기초분야에 등록한자가 작성해야 한다.

8) 기계설비분야 설계용역 과업의 자격

기계설비설계는 기술사법에 의한 기술사사무소(설비부문) 또는 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링사업(설비) 활동 주체가 작성하여야 한다(기계소방의 경우는 관련 법령에 따름).

제2장  과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수시에 다음 서류 3SET를 제출한다. 단, 수급인은 다음 서류를  사업담당 감독관과 사전 협의/승인을 받아야 한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부 [붙임 2]

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부.

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단,업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부.(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일이내 제출 [붙임 3]) 현황 1부.

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부.

11) 보안각서 각 1부.(보안계획서 작성 포함) [붙임 1]

12) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 착수계 제출 후 14일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로  승인된 착수회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 수급인은 다음 내용이 포함된 기본(중간)설계에 대한 보고를 하여야 하며, 사전에  사업담당 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 3부를 제출하여야 한다.

1) 주요내용 안내

(가) 관련법률 저촉여부 확인

(나) 배치안의 합리성

(다) 실배치, 동선의 검토

(라) 수요부 요구 반영사항

(마) 주요자재 리스트의 점검

(바) 구조공법의 검토 및 확정

(사) 실내마감 대안별 검토

(아) 외부마감 대안별 검토 및 확정

(자) 토목계통도 검토, 지반조사결과 검토

(차) 설비시스템 대안별 검토

(카) 녹색(친환경) 건축설계 검토사항

2) 관련법규 검토서

3) 배치, 평면, 입면(안) 3개 대안을 포함한 설계도면

4) 주요자재 리스트

5) 구조공법 검토서

6) 실내마감, 외부마감 대안검토 도면

7) 지반조사 결과보고서

8) 설비시스템 대안검토 도면

9) 개략공사비 내역서

라. 기본(중간)설계도서 납품

1) 기본(중간)설계 검사원 [붙임 4]

2) 각 제출도서는 3개 대안별 구분하여 제출

3) 세부 제출도서는 제6장 납품목록 참조

4) 관련법규 검토서

5) 현장조사 결과보고서

6) 현황측량 성과도

7) 기본(중간)설계도서

8) 지질조사보고서

9) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

10) 녹색(친환경) 건축설계 관련검토서 및 자료

11) 에너지 절약계획서 및 에너지 효율 1++등급, 제로에너지 취득 관련 검토서 및 자료와 에너지관리공단 및 인증기관 제출서류

12) 장애물 없는 생활환경(B/F)인증 관련 검토서 및 인증기관 제출서류

13) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

마. 실시설계 VE 반영결과 제출

1) 설계도면

2) 지형도 및 지질자료

3) 주요 설계기준

4) 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서 및 설계업무 지침서

5) 사업내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함), 공사비산출서

6) 관련법규 등에 기초한 협의 및 허가수속 등의 진행상황

7) 기타 발주자가 요구하는 자료

바. 수급인은 다음 내용이 포함된 실시설계에 대한 보고를 하여야 하며, 사전에 사업담당 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 3부를 제출하여야 한다.

1) 내역서(원가제비율)

2) 인허가용 설계도면

3) 계산서 및 물량산출서

4) 단가산출서, 견적서

5) 공사예정 공정표

6) 기타 납품요구 자료

사. 실시설계도서 납품

1) 실시설계 검사원 [붙임 4]

2) 실시설계도서 일체

3) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

4) 종결보고서

5) 건축협의서

6) 설계검사원

7) 공공건물 에너지관리공단 사전협의서(연면적 3천㎡이상 신축 대상)

(에너지 절약 계획서 검토 수수료 수급인 부담)

8) 각종 인증서(에너지효율등급, 제로에너지, 녹색건축, BF예비 등)

(인증심사수수료 발주처 부담)

9) 기타 발주자가 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

※ 세부 제출도서는 제6장 납품목록 참조

아. 기타 서류

1) 용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제9조)

(가) 주간공정보고  [붙임 5]

(나) 월간공정보고  [붙임 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

※  설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다

가. 업무보고

1) 주간공정보고

매주 월요일 등 날짜를 지정하는 날에 붙임 양식에 의거 제출한다.

2) 월간공정보고

매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

3) 수시보고

설계용역 진행중 문제점이 발생할 경우, 문제점을 분석하여 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

(가) 설계자는 설계진행과 관련업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별  설계 내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

(나) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자  임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

(다) 본 과업지시서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

(라) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

(마) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의 및 계획설계 보고회

(가) 업무착수회의는 착수일로부터 14일 이내에 협의하여 개최한다.

(나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획설계 보고회

설계자는 계획설계(안)을 작성하여 최소환 보고회 7일전까지 담당자와 사전 협의를 거친 후 계획 설계보고회를 발주기관에서 반드시 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

4) 기본(중간)설계 보고회

설계자는 기본(중간)설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 담당자와 사전 협의를 거친 후 중간 설계보고회를 발주기관에서 반드시 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

5) 실시설계 보고회

설계자는 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 담당자와 사전 협의를 거친 후 실시 설계보고회를 발주기관에서 반드시 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

6) 수시회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 기본(중간)설계, 실시설계 보고 시 보고에   필요한 자료를 작성⸱배부하여야 한다.

7) 기타 회의

(가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해관계자 회의,  디자인 향상 위한 회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 과업수행자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

(나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

3. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

1) 공공기관은 중소기업청장이 지정·고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매하도록 한 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」과 제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등)에 해당하는 “직접구매 대상품목”을 반영한다.

2) 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 규정에 따라 녹색제품을 활용하여야 한다.

나. 설계자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재 LIST를 작성·제출하여야 하며, 관급자재 선정을 위하여 각 자재에 대한 비교·검토 결과를 발주청에 보고하고 승인 후 관급자재를 선정한다.

다. 중소기업 생산 제품 중 여성기업생산제품, 장애인기업 생산제품, 중증장애인 생산제품, 기술개발 제품, 녹색인증 제품에 대하여 우선 사용을 검토 하고, 각 제품별 비교 검토서를 제출하여 발주청과 협의하여 관급자재를 선정 하여야 한다.

4. 녹색건축 인증

가. 「녹색건축 인증에 관한 규칙」 및 「녹색건축 인증 기준」(국토교통부고시 제2021-278(2021. 03 26.))에 따른 녹색건축인증 “우수등급(그린2등급)” 이상의 인증 취득을 고려한 설계를 하여야 한다.

5. 설계의 경제성 검토(VE)

가. 수급인은 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 VE책임자와   검토조직으로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는  각종 정보를 충실히 제공해야 한다.

나. 설계VE 분석단계 중 정보수집단계에서는 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다.(특히, 기술적 부분이 주요 논제가 될 경우에 설계팀의 각 전문가들도 함께 참석해서 설명할 수 있다.)

다. 수급인은 VE실행단계에서 VE제안서를 VE책임자로부터 받아 이를 검토하고 이에 대한 의견을 개진해야 하며, VE실행을 위한 설계부서의 최종 적용 검토시 이의 채택여부를 발주부서 담당자와 함께 협의한다.

라. 수급인은 승인된 VE제안의 조치계획서를 작성하고 이를 발주부서에 제출한다.

마. 수급인은 만약 VE제안을 거부할 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유를   밝혀야 하며, 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출해야 하고, 승인된 VE 제안에 대해서는 즉각적인 수정설계를 착수해야 한다.

바. 그 외의 기타 사항은 「설계의 경제성 등 검토에 관한 시행지침」 및 「설계VE  업무매뉴얼」에 따라 효과적인 설계 VE를 지원하기 위해 필요한 조치를 성실히 수행해야 한다.

6. 자문위원회 자문·심의

가. 설계자는 각 설계단계별 각종 법령 및 조례에 따른 심의, 자문, 협의 등을 이행하고, 설계에 반영해야 하며, 발주청의 요청에 따라 분야별 책임기술자 등과 함께 참석하여 성실히 답변하여야 한다.

나. 본 과업과 관련한 각종 심의 및 자문사항(기술자문, 건축위원회 심의, 경관심의 등)은 설계에 반영하여야 하며 부득이 반영하지 못할 경우에는 사전에 발주청의 승인을 득하여야 한다.

라. 심의⸱자문위원회의 사항에 대해서는 검토 후 설계에 반영 여부를 발주청에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

마. 본 과업수행 기간 중 발주청은 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계 사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 수급인이 준비하여야 한다.

바. 기타 심의⸱자문위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 발주청이 정한다.

7. 건축물 에너지효율등급(1++등급)

「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」(산업통상자원부고시 제2020-197호, 2020. 11. 19.)을 준수하여 에너지 효율 1++등급 이상으로 설계하여야 한다.

8. 장애물 없는 생활환경 인증

「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」에 의거 장애물 없는 생활환경(BF)일반등급 이상 인증이 가능하도록 설계 하여야 한다.

9. 제로에너지 건축물(5등급) 인증

「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준」에 의거 ZEB등급 5등급 이상의 인증이 가능하도록 설계 하여야 한다.

10. 신재생에너지 공급 설계

「신에너지 및 재생에너지 개발⸱이용⸱보급 촉진법 시행령」에 의거 건축물의 준공기준(2026년)을 고려하여 36% 이상 공급이 가능하도록 설계 하여야 한다.

11. 하도급 범위

가. 수급인은 발주기관으로부터 도급받은 설계용역을 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없으며 하도급계약에 대하여 그 내용을 발주기관에게 통보하여야 한다.

나. 발주기관이 인정하는 업무에 대하여는 발주기관에는 상세한 하도급 계약내용을 제출하고 승인을 받아야 한다. 이때 설계자(수급인)은 하도급 된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

다. 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

1) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

2) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

3) 제도 및 도면작성 등 작업

4) 건설공사의 수량 및 견적업

5) 기계설비 분야

6) 기타 발주기관이 인정하는 업무

12. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업 지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든  책임은 수급인에게 있다.

제3장  설계수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업은 「건축법」, 「도시공원 및 녹지등에 관한법률」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「자연재해 대책법」,「산지관리법」,「정보통신공사업법」, 「전기공사업법」, 「전력기술관리법」, 「소방시설공사업법」, 「환경영향평가법」, 「화재예방, 소방시설 설치․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」, 「도시교통정비촉진법」, 「녹색건축 인증에 관한 규칙」, 「에너지이용합리화법」,「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 「신‧에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」, 「공공기관에너지이용합리화 추진에 관한 규정」, 「장애인·노인·임산부등의 편의증진보장에 관한 법률」, 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」, 「물의 재이용촉진 및 지원에 관한 법률」, 「이천시 관련 조례」등 당해 사업에 관련된 법령과 각종 고시, 지침 등의 위배가 없어야 한다.

나. 본 과업은 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침, 국토교통부 고시 제2021-981호(2021. 7. 23.)」에 의거 기본설계 및 실시설계를 수행하여야 한다.

다. 상기 기준의 제24조(설계도서 작성기준)는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준, 국토교통부 고시 제2020-635호(2020. 9. 14.)」에 의거 작성하여야 한다.

라. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며,   이를 위반 시 용역계약일반조건 제7절 “1”(지연배상금)에 의거 조치하여도  이의를 제기 할 수 없다. 단, 설계용역 완료 후에라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무, 설계심의, 기관장 보고 및 관련자료의 제출과 설계 미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 별도 수행한다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업 추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2. 설계 일반 지침

가. 납품은 기본(중간)설계(60일) 및 실시설계(180일) 도서로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 설계자는 「건축법」 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약 이행에 문제가 있을 경우에는, 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 경기도 문화재 보호 조례를 참고하여 설계 시 적용하여야 하며, 문화재현상변경 허가 시 용역이 지연되지 않도록 노력하여야 한다.

바. 녹색건축물 보급 및 활성화를 위한 정부정책에 맞추어 신․재생 에너지(태양광, 태양열, 지열, 풍력, 수소에너지 등)를 신․재생에너지의 공급의무 비율 기준이상으로 설치계획에 반드시 포함하여 계획 및 반영한다.

※ 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법」 제12조 및 동법 시행령 제15조 규정

사. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안정성과 조형미를 살리면서 지역의 랜드마크가 되도록 설계하며, 주변환경과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 사업부지 주변환경(진암공원, 진출입로주변 건축물 등)을 연계하여 부지활용도를 높일수 있게 배치시켜야 한다.

3) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

4) 부지 내 도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

아. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지를 반영하여야 한다.

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

자. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

1) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준 적용

2) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준 적용

차. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) 창호, 내·외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

2) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계한다.

3) 기계설비는 신·재생에너지설비를 설계하여야 한다.

(「신에너지 및 재생에너지 개발∙이용∙보급 촉진법 시행령」 제15조에 의한 설비)

4) 빗물이용시설을 설계하여야 한다.(지붕면적 1천제곱미터 이상 시)

(「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제8조에 의한 설비)

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도 반영한다.

6) 이용자의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계를 한다.

카. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우‧오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계를 한다.

3) 주민의 접근이 용이한 외부공간은 OPEN SPACE 계획으로 쾌적한 환경을 조성한다.

4) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계를 한다.

※ 소음진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음∙방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

타. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 준공 이후 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

3) 은폐장소 최소화, 자연감시를 위한 개방형 공간조성, 야간 가시성 극대화

4) 자연적 감시가 용이한 외부 공간 조성하고 수목에 의한 사각지대가 생기지 않도록 유의

(「범죄예방 건축기준 고시」(국토교통부고시 제2021-930호, 2021. 7. 1.)에 적합한 설계)

파. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조이어야 한다.

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에  따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계이어야 함

하. 향후 증축대비 설계(수요기관과 사전 협의 필요)

향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립․반영하여야 함

거. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경 친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재를 사용한다.

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 신기술 및 특허사항, 실용신안 등 제품은 설계시 설계 및 시방서등에 일반자재로 명기하여 특정업체 제품이 설계도서에 명기되어서는 안된다.

6) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

3. 설계진행 시 유의사항

가. 설계 착수시 관련부서 사전협의 결과서를 참고하여 설계시 반영하여야 한다.

나. 건물 배치는 향후 활용을 고려하여 배치하여야 하며, 주변 여건(버스정류장,   보행자전용도로 등) 감안하여 연계동선 계획을 설계에 반영하여야 한다.

다. 수급인은 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용 계획서(또는 신재생에너지 설치계획서)를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.

라. 수급인은 「신·재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정」(산업통상자원부고시 제2021 –66호, 2021. 4. 16.)에 의거 신·재생에너지 중 지열로 설계 시 시험천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서를 작성하여 제출하여야 한다. 단, 시험천공(지열)에 따른 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

마. 수급인은 건물에너지효율등급 (예비)인증서, 녹색건축물 (예비)인증서, 제로에너지(예비)인증서, 장애물 없는 생활환경 (예비)인증서를 용역 완료 전에 득할 수 있도록 하여야 하며, 부득이한 경우 용역 완료 이후에 득하여야 한다.

바. 사인계획

내․외부 각종 안내판 등에 대한 사인계획을 반영하여야 한다.

사. 지질조사 공수는 4공이상(NX공법)이며, 사전에 위치 선정 등 발주기관과 협의/승인 후 시행한다.

아. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

- 공공시설물, 전기/통신/상·하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

자. 수급인은 사업 대상부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

차. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

카. 수급인은 「건설현장 축중기 설치지침(국토교통부 훈령 제1058호, 2018. 8. 1)」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

- 축중기 의무 설치 대상현장 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥이상인 건설공사

- 10,000㎥이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할  필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

타. 수급인은 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라  작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한  방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요,  사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령(설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사,  분석하여야 한다.

파. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

하. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

거. 조명 등기구는 LED 조명 제품 반영을 원칙으로 하며, 예외대상에 포함되는 조명이라 하더라도 「고효율에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)」에 따른 고효율 조명 또는 「효율관리기자개 운영규정(산업통상자원부 고시)」 에 따른 에너지소비효율 1등급 제품을 우선적으로 사용을 원칙으로 한다.

너. 수급인은 각 분야별(건축, 토목, 조경, 설비, 전기, 통신, 소방) 실시설계 도서를 종합적으로 검토하여 향후 시공 시 분야별 도면 상이로 인한 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

4. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계, 철거 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요시 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축 폐기물처리도서는 성상별로 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

5. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일반조건 제2절 “3”에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

8) 인테리어도면 : I

6. 도면작성

가. 제도용지 원도(트레이싱 페이퍼)는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

라. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

바. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

제4장 기술 지침

1. 공통사항

가. 적용요령

1) 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 수급인이 발주기관과 협의하여 구체화시킨다.

2) 수급인은 설계내용에 대하여 발주기관과 협의 또는 상의하고자할 때에는 당해 공종 책임기술자로 하여금 발주기관과 협의한다.

3) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 수급인이 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관과 협의하여 정한다.

4) 본 과업지시서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

5) 발주기관은 수급인에게 설계 중 완성된 부분의 설계도서를 제출․요구하여 수정‧보완 지시할 수 있으며 수급인은 정당한 이유 없이 이를 거절할 수 없다.

6) 각종 계산기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 발주기관과 협의한다.

7) 설계도면 및 시방서에 특정제품․공법을 사용토록 표기할 수 없으며, 신기술 적용 등 부득이한 경우에는 발주기관이 수요기관과의 협의 또는 기술심의를 거쳐 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

8) 설계자는 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부훈령 제2021-1080호, 2021.9.17.) 제4조(공사기간의 결정 절차) 제1항에 의거하여 공사기간에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 고려하여 공사기간의 산정 및 산출근거를 설계성과품의 일부로 제출하도록 하여야한다.

나. 일반 설계지침

1) 본 과업은 구조, 기능, 동선 등 필수요건을 종합적으로 검토 반영하여 본 설계 목적에 부합하고 경제적이고 효율적인 시공이 되도록 한다.

2) 건축, 기계, 전기, 정보․통신, 소방, 토목, 조경, 기타 부대시설 등에 대한 설계기준은 관계법규, 규정, 지침, 조례 등과 정부제정 표준시방서 및 본 설계지침에서 규제한 기준 이상으로 하고 서로 상이한 경우에는 그 규제내용이 강화된 것을 따르도록 하며, 본 설계지침에서 제시한 마감, 설비 등의 자재 및 공법은 최소한의 기준을 명시한 것으로 어떠한 경우라도 동등 이상의 성능을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

3) 용역수행자는 건축물의 배치, 규모, 형태, 색채, 재료, 건축설비, 구조 등에 대하여 주변과의 조화, 경관, 안전성, 기능, 관련법규 및 규정, 경제성 등을 감안하여 최적의 미와 성능을 발휘할 수 있는 디자인으로 설계해야한다.

4) 본 시설의 설계 시 향상된 국내․외 유사시설에 대해 사전에 조사․검토하여 우수한 자재, 시스템 등을 충분히 반영할 수 있어야 한다.

5) 측량, 지반조사 및 지하매설물 조사 등 제공자료와 상이할 시 발주처와 협의하여 수행한다.

6) 모든 적용단위는 SI(The International System of Units)단위의 적용을 원칙으로 한다. 또한 모든 도면 및 자료는 한글로 표기하고 경우에 따라서 영문과 국문을 병용할 수 있다.

7) 각종 재해로부터 건물이용자들을 보호할 수 있도록 내진, 내풍, 내구, 내화, 내수성능 등이 확보되어야 하며 재난으로부터의 긴급피난은 물론 평상시 부주의에 의해 발생할 수 있는 추락, 감전 등 기타 안전사고 예방을 위한 설계자의 검토사항이 설계에 반영되도록 한다.

8) 상위계획(문화재보호법, 각종 영향평가법 등)은 과업기간 중에도 필요시 검토, 반영하고 지형 및 주변여건(자연환경, 교통, 미관, 민원)등을 충분히 고려하여 설계하여야 한다.

9) 「건축법시행령」 제91조3(관계전문기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따른 관계기술자의 협력을 받아 설계하여야 한다.

10) 장애인을 위한 시설은 해당 관련법에 위배되지 않도록 설계하여야 하며, 장애인, 노약자, 임산부등을 고려한 최단동선 및 시설물 이용에 불편이 없도록 하여야 한다.

11) 수급인은 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신, 전기소방, 기계소방 등 각 공종별로 서로 협조하여, 세부 설계내용이 서로 상충되지 않도록 한다.

12) 공사 완료시 준공도서의 작성 등을 요구할 경우 이에 응해야 한다.

13) 공사 설계변경에 따른 건축협의 변경 및 건축물관리 대장 작성 등을 요구할 경우 이에 응해야 한다.

14) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 인정하는 중요한 사항은 발주기관과 협의하여 결정하고 이에 소요되는 비용은 수급인이 부담한다.

다. 특수자재 및 공법의 사용

1) 적용공법은 경제성, 시공성, 안전성 및 효율성 등을 고려하여 선택한다.

2) 국토교통부장관, 산업통상자원부장관이 인정한 신기술･신공법을 우선하여 적용할 수 있으나 사전에 충분히 검증된 것에 한하여 적용한다.

3) 본 사업에 제3자의 특허권이 있는 공법을 적용할 경우 계약상대자는 특허권 사용에 관한 권리의 획득을 증빙할 수 있는 관련자료를 제출하여야 하며, 공사 중 또는 공사완료 후 특허권에 따른 분쟁 발생시 이에 대한 모든 책임을 져야한다.

4) 특수자재 및 공법의 적용시 본 설계서에 그 적용부위, 자재공법의 명칭과 공인기관의 기술 검토서 및 실험데이터 등 적용부위에 적합한 자재공법임을 인정할 수 있는 성능관련 입증자료를 명시하여야 하며, 시방서(설계도서)에 그 품질규격 및 시공방법 등을 명시하여야 한다.

5) 위 ‘4)’항의 공인기관이란 대한건축학회, 국토교통부 산하의 연구원(국토개발연구원, 한국건설기술연구원 등), 대한토목학회, 기타 건설관련 국･공립연구소 등을 말한다.

※ 이때 적용하는 공법 및 우수한 자재, 시스템 등은 반드시 발주처와 협의한 후 결정되는 것으로 주간공정회의를 충분히 활용하여 반영될 수 있도록 조치하여야 한다.

라. 주요자재의 품질관리기준

1) 자재는 한국산업규격(KS표시품 중 1･2급으로 구분된 경우는 1급으로 계획하여야 한다)으로, 성능이 우수하고 유지관리가 용이하며, 국내에서 생산되는 자재를 사용하여야 한다.  다만, 다음의 경우는 예외로 한다.

2) KS표시품이 없거나 수급이 어려운 경우 : 한국산업규격 동등 이상 제품, 타 법령에 의하여 규정된 품질 이상의 제품 사용

3) 국산자재가 없거나 수급이 어려운 경우 : 한국산업규격 동등 이상 제품으로서 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품 사용

4) 사용자재는 환경인증마크품 등 환경친화적인 자재로서 불연성 자재를 우선적으로 적용, 설계하여야 한다.

5) 외국산 자재의 경우에는 사후관리 편리성과 유지보수에 지장이 없는 제품을 적용하여야 한다.

6) 설계서에 제시한 마감, 부착물, 설비 등의 자재는 기준 이상의 성능임을 입증할 수 있어야 한다.

7) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도서에 명기하고 주요자재 및 공법에 대하여는 시방서에 정확한 시방이 제시되어야 한다.

8) 공기단축 및 기능인력 수급을 고려하여 적용공법을 선정하고, 석면 등 인체에 유해한 자재는 사용할 수 없다.

9) 건축물에 부착되는 모든 자재(전기, 정보통신, 기계설비 등 포함)는 건축마감과 조화될 수 있는 미려한 자재로 계획하여야 한다.

마. 성능기준

1) 구조안전성능

(가) 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

(나) 하중 및 지반조건에 충분하게 안전하여야 한다.

(다) 구조체 및 그에 부착되는 부착물은 필요한 내진성능, 내풍성능, 내설성능, 내충격성능을 가져야 한다.

(라) 안전에 대한 여유안전율을 확보하여야 한다.

2) 내구성능

(가) 구조물의 구조설계시 내구연한이 확보되도록 강구하여야 한다.

(나) 건물에 작용 또는 영향을 미치는 각종 역학적 하중, 열, 광, 자외선, 물, 습기, 불, 화학적 물질, 해충 등에 대하여 필요한 조치를 하여 소정의 내구성이 확보 되도록 하여야 한다.

(다) 부식성 자재의 사용은 지양하고, 부득이한 경우에는 방청처리를 하여 최대한 부식되지 않도록 한다.

(라) 구조물의 균열발생은 기준 이하가 되도록 최대한 억제하여야 한다.

(마) 콘크리트 중성화에 대한 예방조치(필요한 철근피복두께 확보 및 내구성 마감재 붙임 등)를 하여 구조물이 쉽게 열화되지 않도록 하여야 한다.

(바) 자재 등은 부위 및 용도별로 가장 내구성이 높은 등급의 것을 사용하여야 한다.

(사) 습기가 많은 위치 또는 물과 접하는 곳에 설치되는 금속제품은 부식방지가 되는 자재를 사용하여야 하며, 관련 전기시설은 접지하여야 한다.

(아) 구조물과 연결되는 각종 설비의 연결은 변형에 대비한 Flexible Joint 등을 설계에 적용하여야 한다.

(자) 향후 설비시설의 원활한 교체를 위한 설계가 되도록 한다.

3) 일상생활시 안전성

(가) 일상적인 생활 중에서 일어날 수 있는 부주의에 의해서 추락, 넘어짐, 부딪힘, 끼임, 화상, 감전, 가스중독 등의 사고가 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

(나) 난간 및 계단은 추락, 전도 등이 발생하지 않도록 설계 하여야 한다.

(다) 부착물은 일상적인 사용에 의하여 탈락되거나 신체에 위해를 끼치지 않도록 하여야 한다.

(라) 차량 등에 의한 충돌시 구조에 대한 안전성 등을 확보하여야 한다.

4) 방화안전성능

(가) 구조물은 내화구조이어야 한다.

(나) 사용자재는 가연성이 아니어야 하며, 부득이한 사유로 가연성 자재를 사용하는 경우에는 감독관이 인정하는 소정의 연소방지 및 방염성능이 있는 것이어야 한다.

(다) 화재발생시 화염 및 연기의 확산이 최소화될 수 있도록 계획하여야 한다.

(라) 화재가 발생할 경우에도 인명피해를 최소화할 수 있도록 필요한 경보, 유도, 피난, 방연, 배연 및 대피시설을 갖추어야 한다. (소방관련법 참조)

(마) 배관 및 덕트 등 방화구획을 관통하는 부분과 층별 방화구획, 방화문틀 주위 등에는 불연재료를 사용하여 틈이 없도록 한다.

(바) 기타 소방관련법에서 요구하는 기준 이상의 시설을 갖추어야 한다.

(사) 화재안전설계의 적정성을 종합적으로 평가한 방재계획서와 화재 등 비상상황에 대비한 위기관리 메뉴얼을 작성한다.

5) 단열(불연제) 및 보온성능

(가) 건축물의 각 부위별로 법령 등에서 규정하는 값 이상의 단열(불연제)성능이 확보되도록 한다.

※ 건축물의 설비에 관한 규칙 중 별표 제4호 건축물 부위의 열관류율표 참조

(나) 단열 및 보온구조는 열교 및 내부결로 현상이 발생하지 않도록 한다.

(다) 단열재 및 보온재는 내이천, 내구성 및 내부식성이 있는 것이어야 한다.

(라) ｢고효율 에너지기자재 보급촉진에 관한 규정｣(산업통상자원부고시)에 정한 성능이 상의 기자재(창호 등)로 설계하여야 한다.

(마) 외기에 접하는 단열이 필요한 실의 모든 부위(벽, 바닥 및 슬라브, 보 하부 등)에는 단열재를 설치하여 동파 및 동해에 대비하도록 하며 건물의 기밀(Air Tight)이 유지되어야 한다.

(바) 국토교통부고시 ｢에너지절약설계기준｣ 에 따라 창호는 기밀재료를 사용하도록 한다.

6) 통풍 및 환기성능(제습선능)

(가) 실마다 실의 용적 또는 최대 사용인원수 및 용도에 적합한 통풍 및 환기가 가능토록 계획하여야 한다.

(나) 일상적으로 사용되는 기능실(탕비실, 청소도구실, 창고, 주방, 설비관계실 및 용도상 자연환기가 곤란한 실을 제외한 모든 실)은 가능한 자연환기가 되도록 설계하며, 지하층의 환기 또한 최대한 자연환기가 가능하도록 한다.

(다) 용도별, 실별 특성을 고려하여 적절한 환기 시스템을 도입하여 실 사용자에게 적합한 통풍 및 환기가 가능하도록 설계되어야한다.

7) 결로방지성능

(가) 건축물의 어느 부위에서도 결로가 발생하지 않도록 단열설계보강, 적절한 환기성능유지 등의 기법으로 결로 방지성능이 확보되어야 한다.

(나) 지하층, 주차장 상부 및 외기에 면하는 상부 슬라브(지붕), 외기에 접한 계단실, 외벽 및 창호는 결로 및 누수의 방지에 특히 유의하여야 한다.

8) 음에 관한 성능

(가) 각 실별 용도별로 적당한 실내 음향조건이 갖추어지도록 필요한 차음･흡음･방음 조치를 하여야 한다.

(나) 자동차 진출입시 발생되는 소음 등에 대한 소음 저감방안 조치를 하여야 한다.

(다) 구조체 바닥은 바닥 충격음이 하층에 전달되지 않도록 하며, 층간차음과 실간 차음 성능이 확보되어야 한다.

(라) 주변 도로의 교통소음으로 인한 지장이 없도록 한다.

9) 실내 환경성능

(가) 사무실 등 일상으로 사용되는 실은 가능한 자연채광이 되도록 한다.

(나) 각 실은 균일한 조도가 확보되도록 인공조명을 설치하고, 자연채광을 적절하게 이용할 수 있도록 조명설비의 부분별 On-Off 조닝을 구분하여 설계하여야 한다.

(다) ｢다중이용시설 등의 실내공기질관리법｣에 따라서 포름알데히드, 휘발성 유기화 합물(VOC) 등이 발생하지 않거나 그 발생량이 작은 재료를 사용하여야 한다.

10) 방수성능

(가) 건물의 어느 부분 및 어느 부위에서도 누수 및 흡수가 되지 않아야 한다.

(나) 방수재료 및 구조는 구조체의 신축, 균열, 산성비 등에 견딜 수 있는 재료를 선택하여, 충분한 내구성이 확보되도록 한다.

(다) 배수는 가장 안전한 경로를 채택하고, 드레인 및 배수관의 수와 크기는 일부가 막히더라도 넘쳐흐르지 않도록 충분한 여유를 가져야 한다.

(라) 구조물의 방수, 배수 및 결로가 합리적인 방법으로 처리되어야 한다.

11) 사용편리기능

(가) 관계실은 서로 연관성을 가지고 사용하는데 편리하도록 배치하여야 한다.

(나) 각종 설비 등은 사용하는데 편리하도록 인간공학적으로 설계하여야 하며, 각종 제어장치는 중앙집중화 하되, 사용상 불편함이 없도록 하여야 한다.

12) 유지관리기능

(가) 시설 및 설비는 유지관리가 용이하여야 한다.

(나) 자재 등은 유지관리에 소모되는 소모품이 적게 들어야 하고 보수용 자재가 쉽게 확보될 수 있는 것이어야 한다.

(다) 각 시설 및 설비별로 관리 및 보수용 점검구, 통로(Catwalk, 사다리 등 포함), 작업공간 등을 충분히 확보하여야 한다.

(라) 추후 보수 및 유지관리를 감안하여 배관(덕트) 등의 보수 및 유지관리를 위한 공간을 확보하여야 한다.

(마) 내구연한이 건축물 내구연한 보다 짧은 전기･기계설비 등은 건축물을 사용하면서 쉽게 교체가 가능하도록 설계에 반영하여야 한다.

(바) 건축물 부지 내의 영구보존이 될 수 있도록 최소 3개소의 독립 축조되는 Bench Mark를 시공도와 함께 건축도면에 명시하여야 한다.

(사) 구조설계시 적용된 적재하중을 명시한다.

(아) 천장재 등을 포함한 각종 마감재 설계 시 주요부재를 수시 점검･조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구 혹은 마감방법 등을 강구하여야 하며, 필요시 조사･점검 통로를 설치하여야 한다.

(자) 건축물 외벽의 유지관리를 위하여 지붕층, 외벽 등에 적절한 조치를 강구하여야 한다.

(차) 건물유지관리 등에 필요한 관리 인력이 최소화 되도록 하여야 한다.

13) 사용자재 및 장비

(가) 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 최대한 국산자재를 사용하고 KS제품과 고효율 인증제품, 조달청 우수제품이 있는 경우 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

(나) 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 안된다.

(다) 모든 자재는 습기 및 결로 예방에 효과적인 자재를 선정하여 결정하고, 공인된 기관에서 인정한 시험성적서를 첨부하여야 한다.

14) 품질관리계획

(가) 수급인은 과업수행 시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성과품의 품질향상을 위한 품질관리계획서를 작성하여 착수계와 함께 제출하고 품질관리계획에는 다음과 같은 사항을 포함한다.

① 품질관리 조직표

② 설계점검 흐름도

③ 점검일자 및 내용(점검자 성명과 서명 등)

④ 점검사항(발주기관의 요구조건, 설계도서 상호간의 불일치, 관련규정, 이행상태 포함) 및 점검방법

⑤ 기타 발주자가 요구하는 사항.

(나) 품질관리계획은 수급인이 계약을 효율적으로 완성하기 위해 모든 업무에 검토 가능한 목록(점검사항)을 작성․검토․수정하여 설계 성과품의 품질이 향상 되도록 한다.

(다) 품질관리계획의 점검사항은 기본설계․실시설계 검사원과 같이 발주기관에 제출한다.

15) 기술용역예정공정표 작성

(가) 수급인은 설계용역의 공정에 대하여 기술용역예정공정표(PERT/CPM)를 작성하여 발주기관에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 수급인은 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정관리기법을 제안할 수 있다.

(나) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 수급인은 발주기관이 동의한 공정계획에  의한 업무의 이행에 책임을 진다.

(다) 수급인은 기술용역공정예정표를 용역착수 시 뿐만 아니라 용역수행과정에서도 항상 재검토하여 적절히 수정․보완한다.

(라) 기술용역 공정예정표에서 조사 및 자료의 수집과 기본설계, 실시설계를 구분하여 표시하고, 본 과업에서 제시한 각종보고회를 포함하여 작성하여야 한다.(단 각종보고회는 예정공정표상에 포함되어야 함)

16) 기타

(가) 지방자치단체 용역계약일반조건에 의거 설계진행 중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없다.

(나) 수급인은 모든 설계과정에서 발주기관이 지정하는 감독자의 지시 감독을 받는다.

(다) 조달청 원가검토 등 타기관과의 자료협의 및 검토 시 관련기관에서 요구하는 방식의 프로그램으로 변환하여 제출이 가능하여야 하며, 변환 시 요구되는 일체의 비용은 수급인이 전액 부담한다.

제5장 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. 「건축물의 설계도서 작성기준」(국토교통부 고시 제2016-1025호, 2016. 12. 30.)  별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 “기본업무 설계도서”와 본 과업을 위해 필요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성 준수 및 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」(국토교통부 고시 제2020-635호, 2020. 9. 14.) [별표2] 건축설계에서의 도서작성 기준에 따라 설계도서를 작성한다.

나. 내역서 작성은 최종 설계도면 확정 후 재검토 실시 후 이천시 계약심사 및 일상감사 의뢰 및 결과를 반영하여 제출한다.

다. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 계획설계

가. 정의

"계획설계"라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계로 설계공모 당선작품으로 갈음한다.

나. 일반사항

1) 계획설계는 설계공모작으로 갈음하며 제출사항은 설계공모 지침서를 참조한다.

3. 기본(중간)설계

가. 정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계(설계공모) 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계(설계공모 당선작)를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정∙보완 과업지시서에 따라 작성한다.

※ 설계공모 당선작품에 대하여 보고회 개최예정으로 주민의견 등을 반영하여 설계진행

※ 주민의견, 발주처 등 의견을 반영한 2개 이상의 대안을 제시 필요

2) 의견을 반영하여 설계자가 제출한 2개 이상의 대안이 부적합하다고 발주자가 검토의견을 통보하는 경우에는 조속한 시일 안에 새로운 2개 이상의 대안을 재작성하여야 한다. 단, 이에 따른 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

3) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완 제출하여 발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

4) 계획 설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

5) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

6) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계 기준을 제시하여야 한다.

7) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등   구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

8) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주자의 승인을 받는다.

다. 설계서 구성

1) 건축

(가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적,  조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패  사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 개략공사비 산정(일위대가표는 불필요)

※ 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

(나) 구조계획서

- 설계근거 기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

(다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

(라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설,  건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 주요 내·외벽, 중심선 또는 마감선 치수, 외부마감재료(실시설계의 기준이 되는 사항)

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물 최고높이, 각층의 높이, 반자높이, 천정 내 배관 공간, 계단 등의 관계를 표현

- 계단 평‧단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평‧입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 인테리어 (평·입·단면도, 상세도 등) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

(가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

(나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

(다) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물

(라) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

(마) 도면종류

- 도면 목록표

- 대지 종·횡단면도

- 각종 평면도

- 포장계획 평·단면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

- 상하수 계통도

- 우,오수 배수처리 평·종단면도

3) 조경

(가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

(나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

(다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 : 조형물, Pergola, Bench, 음수대, 휴지통, 전화 Booth, 안내판류 등

4) 기계설비(기계소방포함)

(가) 설계 설명서:

설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

(나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항

※ 발주기관의 지침을 받아 작성

(다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

(라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도 냉․난방 배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도 등

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 도시가스 인입확인 : 도시가스 인입지역일 경우

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전기(전기소방포함)

(가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수∙변전 설비도와 결선도에 대한 채택 설명

: 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

(나) 계산서

- 부하계산서, 조도계산서(설계 시 산출근거 제출)

(다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로  표시할 수 있다.

(라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

(가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV, 빌딩안내시스템, 출입통제설비, 주차관제설비 기타 설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명

: 국선인입, 통신실의 배치, 결선도등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

(나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

(다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.                          단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

(라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로,  통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면 및 법규 확인서

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라   작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게   산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등   계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

(가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적,  조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

(나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

(다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

(라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체 (축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥, 보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성한다.

(마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 토목

(가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

(나) 구조 및 수리계산서

(다) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고  실시설계내용에 반영

(라) 시방서

(마) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

(바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

3) 조경

(가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

(나) 시방서

(다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도 및 각 시설상세도

- 관수계획도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

(라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비(기계소방포함)

(가) 설계 설명서

냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기 투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

(나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

(다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

(라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

(마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기(전기소방포함)

(가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

(나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 소화계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

(다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법,  주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과  특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

(라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의  정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

(마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서,       일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

(가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV, 빌딩안내시스템, 출입통제설비, 주차관제설비, 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명

: 국선인입, 통신실의 배치, 결선도등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

(나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

(다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.  단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로  표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인  내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

(라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결 방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V,

MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

(마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

7) 기타(공공건축심의위원회 사항)

(가) 건축물의 피난층 외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 법정 보행거리 이내로 설치해야한다.(가급적 건축물 양 끝에 배치)

(나) 야간조명(경관)을 계획하되 주변 주거환경에 피해를 주거나 부정적인 영향을 미치지 않게 유의하여 반영한다.

다) 기후변화 저감을 고려하여 옥상녹화, 벽면녹화, 다층식재 등을 권장한다.

라) 주차공간은 지상부에 최소 필요로만 확보한 후 지하층으로 배치한다.

마) 주차공간은 법정규격 이상으로 설치하여 편리함을 확보한다.

제6장 설계도서 납품목록

1. 기본(중간)설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	기본(중간) 설계(안) 2개	A3	4	부	주민의견, 발주처요구 등을 반영한 대안 개략적 조감도 및 스터디 모형 포함
2	현황측량성과도	-	2	부
3	관련법규 검토서	A4	4	부

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
4	기본(중간) 설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	설계 도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
6	내 역 서 (관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
7	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방
9	지질조사보고서	A4	5	부		◯
10	각 인증 관련 검토서	A4	2	부								제로에너지, bf등 대상 인증
11	각종 심의⸱자문 제출도서	A4	2	부

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

2. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	원도	A1	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	설계도면	A3	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	계산서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	관급내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위대가표	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	특기시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	조감도		3	부	◯							표구 포함 (0.6m*0.9m이상)
15	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
16	USB		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
17	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	기계/전기/통신 관급도면 (A3반접) : 3부 추가
18	에너지관리공단 사전협의서

1) 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5매와 원본File을 USB로 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

※ 건물에너지효율 (예비)인증서, 녹색건축물 (예비)인증서, 제로에너지 (예비)인증서, 장애물없는 생활환경 (예비)인증서는 부득이한 경우나 용역기간 내 미완료시 용역기간 완료 후 득하여야 함

4) 실시설계 납품도서의 변경이 있을 경우 발주자와 협의하여 변경할 수 있다.

나. 종결보고서

종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치 결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 USB에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구 부수

마. 조감도(A1 이상, 표구 포함) 3부

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

사. 기타 발주자가 요구하는 성과품.  끝.

〔붙임1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 : 남부권장애인복지관(경기마음건강케어팜) 건립 기본 및 실시설계용역

2. 계약  일자 : 2023 .   .   .

3. 착수  일자 : 2023 .   .   .

4. 완수예정일 : 2023 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며   그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2023년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

이천시장 귀하

〔붙임2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 남부권장애인복지관(경기마음건강케어팜) 건립 기본 및 실시설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2023.   .   .

4. 착수  일자 : 2023.   .   .

5. 완수예정일 : 2023.   .   .

-  아        래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가  수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2023년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

이천시장 귀하

〔붙임3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 : 남부권장애인복지관(경기마음건강케어팜) 건립 기본 및 실시설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2023.   .   .

4. 착수  일자 : 2023.   .   .

5. 완수예정일 : 2023.   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건    제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2023년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

이천시장 귀하

〔붙임4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 : 남부권장애인복지관(경기마음건강케어팜) 건립 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2023.   .   .

4. 착수일자 : 2023.   .   .

5. 완수예정일 : 2023.   .   .

붙  임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획,중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2023년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

이천시장 귀하

〔붙임5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 : 남부권장애인복지관(경기마음건강케어팜) 건립 기본 및 실시설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2023년  월  일 ～ 2023년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(2023. . .)	금주예정사항(2023. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

이천시장 귀하

〔붙임6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 : 남부권장애인복지관(경기마음건강케어팜) 건립 기본 및 실시설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2023년  월  일 ～ 2023년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (2023. . . ～ 2023. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

이천시장 귀하