기본 및 실시설계 용역 과업지시서

2025. 3.

당진시 육아종합지원센터 건립 리모델링 공사

	당진시 (여성가족과)

Contents

제1장 총 칙

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 개요	1

4. 과업의 범위	3

5. 용역중지 등	4

6. 과업의 방향	4

제2장 과업의 내용

1. 과업수행중 단계별 제출서류	5

2. 업무보고 및 회의	5

3. 적용기준	7

4. 설계공모 심사의견 반영	8

5. 설계의 범위	8

6. 별도 추가업무	8

제3장 과업수행 지침

1. 공통사항	9

2. 조사 및 자료수집	11

3. 계획, 중간설계	11

4. 실시설계	12

제4장 설계지침

1. 법령 등 적용기준	14

2. 설계 일반지침	15

3. 설계 세부지침	17

4. 설계 도서의 분리작성	20

5. 설계도서 표기	20

6. 도면작성	20

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서	22

2. 중간설계 납품도서	22

3. 실시설계 납품도서	22

제6장 예정 공정표

1. 예정 공정표	24

【부록】

〔붙임 1〕 위치도	25

〔붙임 2〕 보안각서	26

〔붙임 3〕 책임기술자 선임계	27

〔붙임 4〕 하도급승인 요청서	28

〔붙임 5〕 (중간, 실시)설계 검사원	29

〔붙임 6〕 주간공정보고	30

〔붙임 7〕 월간공정보고	31

〔붙임 8〕 특정자재 사용목록	32

Ⅰ		총 칙

1. 과업의 명칭 : 『당진시 육아종합지원센터 건립 리모델링 공사』 기본 및 실시설계 용역

2. 과업의 목적

ㆍ당진시민을 위한 맞춤형 보육서비스 제공과 보육인프라 확대를 통한 최상의 보육환경 조성

ㆍ어린이집 지원 및 관리, 가정 양육 보호자를 위한 육아지원 거점기관 건립

3. 과업의 개요

가. 대지위치 : 충청남도 당진시 당진중앙1로 83(읍내동 524)

나. 면    적 : 대지면적 521㎡,  건축면적 : 308.8㎡

다. 지역/지구 : 준주거지역

라. 연 면 적 : 1,279㎡

마. 층수/구조 : 지하1~지상3층, 철근콘크리트조(노유자시설)

바. 리모델링대상 : 건물외관, 지하1층~지상3층, 엘리베이터, 현관 등

사. 공간 구축 계획

구 분	세부시설		산출근거	면적(㎡)	비율(%)	비 고
지하1층	부속공간	자료보관실/창고	창고	40	3.1	지하1층은 차후 활용계획 수립하여 운영
		장난감 보관창고	창고	30	2.3
		장난감 정비, 소독실	창고	20	1.6
		직원휴게실 및 회의실	휴식공간	60	4.7
	소계			150	11.7
지상1층 (휴식 및 돌봄공간)	육아지원공간	자유놀이 공간	놀이체험실	40	3.1	유아 화장실 설치 및 놀이공간 확대 고려
		휴게쉼터 (무인카페)	안내데스크 옆 휴게실	30	2.3	안내데스크 연계
		수유실	보육시설	10	0.8
	소계			80	6.3
지상2층 (육아지원 공간)	육아지원공간	놀이치료실	유아교육실	60	4.7	가구 등은 어린이 눈높이에 맞도록 계획
		교사 대기실	사무실	50	3.9
	부모교육공간	상담실	부모상담	20	1.6	개인정보 보호 가능토록 설계
		세미나실 (프로그램실)	교육실	35	2.7
	소계			165	12.9
지상3층 (어린이집 지원공간)	사무공간	사무실	사무공간	55	4.3	내부에 탕비실, 비품실 고려
		센터장실	사무공간	25	2.0
	교육공간	대회의실 (교육실)	교육 및 업무공간	85	6.6	이동식 가구배치 및 개방감있는 설계로 다양한 형태로 이용토록 반영
	소계			165	12.9
영역별 면적 합				560	43.8
공용면적	기계실, 전기실			70	5.5
	홀, 복도, 계단, 엘리베이터, 화장실, 창고 등			649	50.7
	소계			719	56.2
영역별 면적+공용면적					100
주차장	옥내				제외
	지하
	소계
총 연면적 (영역별 면적+공용면적+실내주차면적)				1,279	100	각실 공간 구성 및 면적 조정가능

※ 건축연면적 등 공사규모 및 사업개요는 설계과정에서 당진시(이하□발주기관□이라 한다)와 계약상대자

(이하□수급인□이라 한다)의 협의에 따라 변경될 수 있으며, 설계자는 이를 반영하여 설계하여야 한다.

※ 설계용역 착수 전 관계자회의를 거쳐 구체적인 필요실, 배치, 면적 등에 대하여 협의한다.

아. 예정공사비 : 금2,112,000,000원(부가가치세 포함)

1) 제시된 예산액은 건축, 실내인테리어, 구조, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리, 철거공사 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함하여야 한다.(단, 추후 발주청의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

2) 공사비 조정 협의 시 관련 검토 자료를 작성한다.

3) 낙찰 차액을 감안해서는 안된다.(공사예정가격이 예산을 초과할 수 없음)

바. 설계용역비 : 금151,700,000원(부가가치세 포함, 설계공모비 제외)

※ 건축, 실내인테리어, 구조, 기계, 전기, 통신, 소방, 토목, 철거 등 설계용역비와 건축헙의(인허가). 심의 등 제반분야의 행정절차 비용을 포함한다. 단, 인증수수료는 발주기관이 부담한다.

※ 필요시 공사비 내역서는 발주기관의 연차별 예산현황에 맞춰 차수분리하여 공사계약이 가능하도록 분리·작성하여야 한다.

※ 건축 연면적 등 공사규모 및 과업개요는 설계과정에서 발주기관 및 관계기관 협의결과에 따라 변경될 수 있으며, 설계자은 이를 반영하여 설계함.

차. 과업기간 : 착수일로부터 90일(공휴일 포함)

- 해당기간은 설계용역 과업 성과품 납품 기한으로, 각종 인·허가, 심의, 인증 등에 소요되는 기간은 발주기관과 협의하여 과업 일수에서 제외할 수 있음

- 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

① 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

② 발주기관의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

③ 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

④ 과업수행과 관련한 협의(협조) 부서의 업무처리 지연으로 과업수행에 현저한 차질을 초래한다고 발주기관이 판단할 경우

⑤ 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 때

4. 과업의 범위

가. 본 과업은 당진시 육아종합지원센터 건립 리모델링 공사의 건축, 인테리어, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등의 설계용역으로 계약상대자는 본 과업지시서, 관계법령, 규정, 지침에 따라 이행하여야 한다.

나. 본 과업은 발주기관과 계약자(이하 “설계자”라 한다)가 체결한 용역계약서 및 과업지시서에 의한 설계도서 작성을 그 범위로 한다.

1) 계획·중간설계도서 작성

2) 실시설계도서 작성(가설계획 포함)

3) 건축 인․허가 관련 도서

4) 공사예정공정표 작성

5) 조감도 및 투시도 작성

6) 기타 공사를 수행하는데 필요한 설계도서 작성

다. 인․허가 업무수행

1) 본 용역의 건축 인․허가(착공신고, 건축물대장생성 등 포함)는 설계자가 수행하며, 건축 인허가에 수반되는 심의가 있는 경우 설계자는 건축 관련 심의도서를 작성하고, 심의 이행을 위하여 적극 협조하여야 한다.

2) 설계자은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가에 필요한 제반 절차 등을 숙지하여 필요시 발주처와의 협의 등을 거쳐 과업을 수행하여야 한다.

3) 본 과업의 사전재해 영향성평가, 교통영향평가 등 각종 영향평가, 도시계획시설 결정(변경) 및 실시계획의 인가를 실시할 경우 설계자는 각종 용역업체와 협의하여 업무에 적극 협조하여야 한다.(해당 시)

라. 주민설명회, 설계보고회 등에 대한 업무수행, 건축협의와 관련된 도서작성 및 업무대행, 설계자문심의, 건축심의, 공공디자인심의, 건축협의 등 각종 심의에 필요한 조감도 및 투시도 등 서류작성 및 업무대행 등 발주기관이 업무와 관련이 되어 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함

마. 해당 인증에 관한 서류작성 및 인증 획득

1) 설계용역 성과물은 제반 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다.

2) 필요한 인증 등을 획득하도록 설계하되 사전 발주부서와 협의 완료 후 유관기관과 협의한다.

3) 법적 대상이 아니더라도 필요하다고 인정되는 경우에 발주부서는 설계 및 인증　업무에 대해 요구할 수 있으며 협의를 통해 진행한다.

바. 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 설계자의 협의 하에 수행한다.

사. 본 과업을 수행함에 있어 공사비 산정 시 표준품셈 적용을 원칙으로 하여야 하며, 인테리어·기계·전기·통신·소방 등 특정업체의 설계 및 자재를 참여시켜서 공사비의 증액 또는 물품이 품절되어 부실시공이 되지 않도록 하여야 한다.(다만, 제작 등 부득이한 경우에는 제외되나 2개 이상의 업체 견적서를 첨부하여야 한다.)

아. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는데 발주청이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대하여 이행하여야 한다.

5. 용역중지 등

1) 계약상대자의 귀책 사유가 아닌 인허가 또는 관계부서(기관) 협의 지연 등으로 인하여 용역의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 발주처는 용역 중지를 명할 수 있다.

2) 본 과업 추진과 관련하여 예산의 감액, 발주처의 추진계획 변경 등에 따라 과업의 수행이 불가능하거나 불필요할 경우 부분 준공할 수 있으며, 부분 준공 시 정산기준은 지방계약법령에 따른다.

6. 과업의 방향

가. 고려사항

1) 공간 프로그램 및 면적은 발주기관의 안으로 설계 용역 추진 과정에서 시설의 관리, 운영 및 각종 심의(자문) 등에 의해 수정 변경될 수 있음.

2) 영역별, 실별 공간구성 비율은 설계자의 공간 계획안에 따라 제시된 비율을 기준으로 ±10% 범위에서 상호 조정 가능

3) 공간별 면적에서 제시된 면적은 벽으로 구획되는 것을 의미하지 않고 개방된 공간 내에서 영역을 나타내기도 함으로 유연하게 설계할 것.

4) 상주인력의 업무 환경 개선을 위한 설계를 해야 하며 업무에 필요한 창고 등을 상황에 따라 계획할 수 있음.

5) 공공건축심의 및 총괄계획가, 총괄‧공공건축가의 의견을 충분히 반영할 것

2		과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 설계자는 용역착수 시에 다음 서류 2SET를 제출한다.

1) 착수계 1부(공문포함)

2) 책임기술자 선임계 1부 [붙임2]

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축,인테리어,구조,기계,전기,통신,소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표(계획 및 중간, 실시설계의 납품 예정 일자, 인허가 협의 예정 일자, 내역작업 완료 예정 일자 등 정확한 날짜를 명기하여 작성) 1부

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정 현황 1부

11) 설계참여자 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함) [붙임1]

12) 기타 관련서류

(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항 등)

13) 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 사항

나. 설계자는 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

2. 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

가. 업무보고

1) 월간공정보고

발주처와 요일을 정하여 매주 [붙임 7]양식에 따라 감독관 및 발주청 담당자에게 제출한다.

① 월간공정보고(수시보고가 있었던 주의 월간보고 생략가능)

- 과업 추진 내용 및 공정현황

- 과업수행 상 문제점 및 대책

- 참여기술자 현황(작업일지 및 투입일 수 포함)

2) 수시보고

설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 감독관 및 발주청 담당자에게 제출하여야 한다.

3) 각종 보고회 및 설명회

① 본 과업수행 기간 중 설계사항에 대한 설명회, 공청회, 보고회 등을 실시할 시 필요한 설계도서 및 PPT자료 등을 준비 및 협조를 하여야 한다.

② 보고회 및 설명회 시 제기된 의견은 반영 여부에 대한 적정성 검토 및 발주자와 협의하여 설계에 반영해야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주청과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명하거나 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업지시서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주청의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료를 작성하고 회의에 참석하게 하여야 한다.

마) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주청의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무 착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무 착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 수시회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획･중간 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성·배부하여야 하며 보고 회의는 상호 간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

4) 기타 회의

가) 발주청의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 설계자는 발주청의 요청에 따른 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주청에서 별도 통보할 수 있다.

5) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주청에 제출하여야 한다.

다. 관련기관 인․허가 및 협조

1) 설계자는 설계도서 납품 전 관련 법규에 의한 건축협의 내용을 반영하여 납품하여야 하며, 관련 법규 미준수에 따른 책임은 설계자에게 있다.

2) 설계자는 본 과업 수행 중 구조물 계획 및 설계 시에는 관계부서 및 발주기관과 협의하여야 한다.

라. 설계검토

1) 설계자는 본 과업수행 기간 중 관련 법령 또는 발주기관의 필요로 구성되는 위원회의 자문과 검토의견이 있을 시 해당 내용을 반영하여야 한다.

2) 실시설계 완료 후 구미시 감사실의 내역심사를 받아 공사의 품질확보 및 예산의 낭비를 방지하도록  협조해야 하고, 계약상대자는 심사에 필요한 자료 준비와 협조를 하여야 한다.

3) 계약상대자는 설계용역 중 받은 심사결과 및 자문결과에 대해 설계도서에 충실히 반영하고  승인받아야 한다.

4) 본 과업수행 기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계  사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

마. 설계에 사용하는 재료

1) 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 국산자재(관내-당진시 제품 최우선 반영)를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품과 국토교통부 지정 AT인증, 기획재정부 지정 NT인증, 고효율 인증 환경부 지정 친환경제품이 있는 경우 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요 자재의 수량, 단가, 금액 등은 발주기관과 협의 후 채택한다.

2) 설계자는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행규칙 제86조, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 시행령 제11조에 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

3) 건축물에 사용되거나 부지에 매설되는 제품은 인체에 유해한 물질(예 : 석면 등)이 함유된 자재의 사용은 아니 되며, 가능한 친환경 자재의 사용을 고려한다.

바. 사용언어 및 문자

과업수행 상 사용문서는 한글과 아라비아숫자로 작성하며, 사용언어는 한국어로 한다.

사. 기 타

1) 설계진행 중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 시 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며 상호 협의하에 이를 이행하여야 한다.

2) 설계자는 모든 설계 과정에서 발주기관과 협의하여 원만히 과업을 진행하여야 한다.

3) 계약자로 선정되어도 추후 필요하다고 판단되는 당진시의 요구를 충실하게 수용한다.

4) 관계법령 준수

설계자는 설계내용이 건축법, 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률, 노인복지법, 주차장법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건설기술진흥법, 소방법, 전기사업법, 전력기술관리법, 에너지이용합리화법, 전기통신기본법, 전파법, 정보통신공사업법 등 기타 관련법규 및 제반규칙 등 관계법령에 위배․저촉되지 않도록 설계용역 과업을 수행하여야 한다.

5) 용역비 정산

가) 본 과업 수행 중 발주기관의 사업계획변경 등에 따라 과업내용의 변경․사업취소 등이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위와 대가를 조정․변경할 수 있다.

나) 과업범위의 현저한 변경 없이 설계 결과 과업내용서에서 제시한 공사비를 초과한 범위에 대하여는 용역비를 증액 지급하지 않는다.

3. 적용기준

가. 본 설계용역은 건축, 인테리어, 기계, 전기, 통신, 소방 관계법령 및 규정에 따른 설계기준, 시방서 등에 의거 수행하여야 한다.

나. 설계자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 및 시방을 포함하여 제출한다.

다. 기획재정부에서 새로 제정되는 KSC IEC, KSC ISO 규정을 적극 반영하도록 한다.

라. 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항에 대하여는 감독관과 협의하고 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준에 따른다.

4. 설계공모 심사위원 의견 반영

가. 설계자는 특별한 사유가 없는 경우 설계공모 심사위원의 심사의견에 대하여 설계에 반영될 수 있도록 조치한다.

나. 설계자는 심사의견을 설계에 반영하기로 한 경우에는 반영계획을 제출하고, 심사의견을 설계에 미반영하기로 한 경우에는 정당한 사유서를 발주기관에 제출하고 승인을 받아야 한다.

5. 설계의 범위

가. 건축, 인테리어, 전기설비, 소방, 폐기물처리 등 전분야

- 건물 외벽 리모델링에 대한 사항(단열재, 창호 포함(열관류율))

- 건물 구조변경 및 공간구성에 관한 사항

- 엘리베이터 및 현관 증축에 대한 사항

- 옥상 방수에 대한 사항

- 상하수도 교체에 대한 사항

- 창호 및 각 출입문 수선, 내외부 도색에 대한 사항

- 냉난방시설 점검 및 수리에 대한 사항

- 화장실 보수 및 장애인시설 등에 대한 사항

- 전기조명시설의 교체, 각 실 콘센트사용에 대한 사항

- 공간에 배치할 탁자, 의자 등의 디자인 설계 사항

- 방음공사 및 시설보강에 대한 사항

- 전기 및 통신시설에 대한 설치 및 효율적 배치에 대한 사항

- 기타 추가계획 발생 시 제안 설계 업무

나. 설계용역 계약 완료 후에 발생한 과업과 관련한 각종 변경 업무에 대한 제반사항, 설계미비 및 하자에 대해서는 반드시 개선 업무를 수행하여야 한다.

6. 별도 추가 업무

건축사법에 의한 기본 업무와 아래와 같은 업무도 용역에 포함한다.

가. 설계관련 부가업무

1) 건축허가 신청서 작성, 관련기관 업무 협의, 협의 결과 이행하여야 할 절차 이행 및 관련 대리 업무

2) 투시도 또는 조감도

3) 계약심사 담당부서에 공사발주를 위한 계약심사업무 협의서류 작성 업무

- 설계(공사비산출, 수량산출 등)에 대한 적정성 심사자료

4) 담당부서에 설계의 경제성 검토를 위한 협의서류 작성업무 및 검토결과 반영업무

5) 「건설기술 진흥법」에 의한 설계의 안전성 검토 대상사업으로 계획시, 이에 따른 업무(발주기관과 협의)

6) 당진시 공공디자인심의 등 업무(실내 인테리어 디자인계획 포함)

7) 산업안전보건법에 따른 기본안전보건대장 작성 및 검토업무

8) 주민설명회 등을 위한 건축계획 설명자료 작성(필요시)

나. 조사·기획업무

1) 기획 및 경제성 검토, 일정의 검토

2) 조사·검토에 바탕을 둔 조사보고서, 기획설명서 등의 작성

3		과업수행 지침

1. 공통사항

가. 적용요령

1) 본 과업지시서에 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 관련 법령과 기준에 따르도록 하고 그 외의 사항은 발주기관과 과업수행자가 협의하여 정한다.

2) 본 과업지시서에 대한 대안이 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

3) 발주기관 및 관계부서와 긴밀한 협조체제를 유지하고 분야별 전문가를 적극 참여시켜야 한다.

4) 설계는 환경친화적이고 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

나. 발주기관, 설계자의 책임 및 의무

1) 발주기관의 책임 및 의무

가) 발주기관과 설계자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.

나) 설계자가 발주기관에 용역과 관련하여 자료를 요청하였을 경우에는 적극 협조하여야 한다.

다) 설계자가 각종 계획이나 결과에 대하여 승인을 요청하였을 경우 부득이한 경우를 제외하고는 15일 이내에 결정하여 설계자에게 통지하여야 한다.

2) 설계자의 책임 및 의무

가) 설계자는 건설공사의 시행과정에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금 계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 이루어지도록 한다.

나) 설계자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역착수 시 계약에 의거 발주기관이 요구하는 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구조건들을 숙지하여야 한다.

다) 설계자는 발주기관의 승인 없이 과업의 범위를 변경할 수 없다.

라) 설계자는 건축과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하고 그에 대해 총체적 책임을 진다.

마) 설계는 관련법규와 계약조건, 발주기관과 협의된 설계조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 설계자는 발주기관에게 그 내용을 보고하여야 하며 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관과의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.

바) 설계자는 설계용역과 관련하여 발주처가 제공하여야 하는 자료에 대해 이용 요청을 할 수 있으며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 계약문서 간의 상이점에 대해 즉시 발주기관에게 알려야 한다.

사) 설계자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상황을 정확히 반영해야 하며, 모든 설계도서에 실제조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

아) 설계자는 계약체결 시와 설계용역 착수 시 그리고 설계도서를 완성하여 제출할 때는 반드시 대지를 확인하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생하지 않도록 하여야 한다. 대지의 조건에 중요한 변경이 발생되었을 때는 발주기관에 보고하고 필요한 조치를 강구하여야 한다.

자) 설계자는 설계 추진과정에서 건축, 인테리어, 기계, 전기, 통신, 소방 등 각 공종별로 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용이 서로 상충하지 않도록 필요한 부문별 협조에 만전을 기하여야 한다.

차) 설계서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생하는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 「건축사법」제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항 등에 의한 손해배상 책임을 진다.

카) 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호 간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 도면과 내역불일치 등)로 인하여 발생하는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 한다.

타) 설계자가 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 소유권 및 저작권에 관련한 제반사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

3) 책임기술자 및 참여기술자 등의 교체

가) 설계자는 발주자가 책임기술자 및 과업에 참여하고 있는 기술자가 용역수행에 불성실하거나 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 이에 응하여야 한다.

나) 책임기술자가 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그 기간 동안 대리인(동등 이상의 자격 및 경력을 가진 자)을 지정하여 과업을 수행하여야 한다.

다) 설계자는 책임기술자 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 사전에 발주자의 승인을 받아야 한다.

4) 보 안

가) 설계자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 개인 또는 특정 단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나) 설계자는 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

① 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다. (착수계 제출 시 설계 참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

② 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출해서는 안된다.

③ 설계자는 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생하는 모든 책임은 설계자가 진다.

5) 설계 관련 현황 자료

가) 설계자는 업무의 수행에 따라 요구되는 자료는 서면으로 발주기관에 제출하여 필요한 조치를 취하도록 해야 한다.

나) 설계자는 당해 대지에 대한 실사를 하여 건설공사 단계에서 우려되는 사항(인접대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애요인 등)을 조사하여 발주기관과 협의하고 해결책을 강구하여야 한다.

다) 설계자는 대지경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하 매설물, 이용가능한 시설이나 상태, 조사자료, 일반적 기록, 추가정보 등을 확인하여 설계를 하여야 한다.

라) 공사비

① 설계자는 용역수행 시 본 과업에서 명시한 공사비 범위 내에서 사업이 추진될 수 있도록 추정공사비에 대한 검토를 지속적으로 하여야 하며 공사비의 현저한 변경이 예상되는 경우 해당 사항을 발주처에 보고하여야 한다.

② 개산견적과 별도로 상세견적은 계약서에 의한다. 설계자는 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가발생비용, 기존시설의 일시 이동비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

2. 조사 및 자료수집

가. 현지답사

1) 설계자는 현지답사하여 지형 등의 자연상황, 주변도로, 용지조건 지하매설물 등을 상세히 파악하여야 한다.

2) 현지답사 시에는 반드시 사진을 촬영하고 민원발생 또는 구조물계획 시에 참조한다.

나. 지장물 조사

1) 계획부지 내 각종 지하 매설물, 지상의 지장물은 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계에 반영한다.

2) 지장물 중 이설이 필요한 시설은 해당기관과 협의하여 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

3) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과 상의하여 적절한 보호방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

4) 조사한 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어야 한다.

3. 계획‧중간설계

설계자는 본 과업지시서가 의도하는 목적이나 건립 취지에 따라 시설물의 배치, 형태, 개략공사 방법 및 추정공사비 등에 관하여 조사 및 분석, 검토를 거쳐 최적안을 선정하고, 이를 설계도서로 표현하여야 한다.

∙ 설계자는 계획 및 중간설계(안)을 작성하여 발주기관에 보고 후 협의하여 실시설계(상세도 작성, 분야별 설계 등)를 진행하여야 한다. 지역지구에 따른 건축법규 분석과 추정공사비 산정 등을 포함한다.

∙ 설계 요구조건을 만족해야 한다.

가. 용역 내용

1) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 파악

나) 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

다) 관계법령 조사

라) 관련 기관 또는 부서와의 협의

마) 일정표 조정

바) 리모델링 규모

사) 평면 및 입면, 단면 계획

아) 동선계획

자) 배수계획(화장실 신설부분)

차) 방수계획(화장실 신설부분)

카) 시공계획

타) 유지관리계획

파) 민원유발사항 검토

2) 조건 설정

가) 설계 조건의 설정

나) 설계 방침의 설정

① 설계 개념의 확립

② 개략 시방서의 설정

③ 사용 재료 및 기기 등의 설정

3) 비교 및 검토

가) 성능 면에서의 기능의 검토

나) 설계 이념․의장 및 구조 형식 등의 검토

다) 계획을 실행하기 위한 공사비의 검토

라) 계획을 실행하기 위한 시공성의 검토

마) 시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

바) 유지관리상의 검토

사) 사용기기, 재료 등의 검토

아) 지역사회 및 주변 공공기관 및 시설 등과 연계방안 모색

4) 종합화

가) 기능 배치계획의 책정

나) 공간 구성 계획서의 책정

다) 공사비 배분 계획의 책정

라) 동선계획의 책정

마) 방재계획의 책정

바) 시설 배치계획의 책정

사) 평면, 입면, 단면 계획의 책정

아) 구조 계획의 책정

자) 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)의 책정

차) 각종 설비(전기, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 특수설비 등) 계획의 책정

카) 각종 계획의 종합 조정

타) 수요자의 요구사항 종합 및 책정

4. 실시설계

설계자는 계획 및 중간설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 실시설계를 진행하여야 한다.

∙ 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

∙ 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전관리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

∙ 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 아니하도록 태풍․혹서․혹한 등으로 인한 작업불능일 수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

∙ 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조계산서, 공사비 내역서, 발주기관이 승인하는 공사공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

∙ 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주기관에 제시하여야 하며, 발주기관의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에는 설계자는 도면을 수정하여야 한다.

∙ 작업발판(비계)을 설치할 때에는 반드시 일체형 작업발판(시스템비계)을 설계에 반영하여야 한다.(공공공사 추락사고 방지에 관한 지침, 19.04)

∙ 도면과 시방서는 이용자수와 행태를 고려한 공간 요구 조건을 충족시키기 위해서 필요한 모든 정보를 포함하여야 한다. 또한 주어진 범위 내에서 입찰자들의 완벽한 건설공사 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

∙ 내역서 작성 시 주설계자 공동도급 내역서로 작성하여하며, 설계 준공 전 주설계자 공동도급을 위한 공정분리 적정성 검토 자료 작성 및 위원회 의결을 거쳐 내역서 최종 작성하여야 한다.

- 내역서에 전자인력제 관리를 위한 단말기 사용금액 및 고용개선지원비를 반영하여야 한다.

가. 용역 내용

1) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)

나) 현지 상세 조사 및 확인

다) 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

라) 특수 공법 부분의 상세 조사

마) 각종 법령 수속에 대한 협의

바) 일정표 조정

사) 담당자와 협의 한 내용

2) 조건 설정

가) 계획․중간 설계에 의한 설계조건의 상세한 설정

- 각 부분의 요구 성능의 확인

- 법령, 기타 제약 조건의 각 부분 파악

- 각종 하중 조건 및 해석 수법 설정

- 각 설비의 요구 성능의 확인

나) 공사비의 파악

다) 계획․중간 설계에 의한 설계 방침의 전개

라) 기기류의 배치 및 사용 방식의 결정

마) 배관 배선 등의 계통 및 경로의 설정

3) 비교․검토

가) 각 부분 기능의 검토

나) 공간 표현의 검토

- 형태의 검토

- 사용 재료의 검토

다) 공사비의 검토

라) 시공 기술의 검토

마) 사용기기 및 사용 재료의 검토

바) 각종 설비 방식의 검토

사) 유지관리에 관한 검토

아) 관계법령 등의 조합 및 검토

4) 종합화

가) 외부 공간 설계

나) 내부 공간 설계

다) 평면, 단면, 입면 및 상세설계

라) 각 부분 사용재료 및 시방의 설정

마) 방재설계

바) 색채 계획의 책정

사) 공사비 계산과의 조정

아) 응력 해석 및 구조 설계

자) 각종 설비의 설계

차) 사용 재료, 사용기기 및 사양의 결정

카) 각종 설계 등의 조정

타) 각종 계산서, 견적서 등 제출

파) 사인물 계획

하) 실내·외 공간설계(재료, 색채, 가구, 조명계획 포함)

나. 도면의 분야별 협업 및 조정

1) 설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 설계자가 책임을 지고 협업․조정하여야 한다.

2) 설계자는 정확한 축척, 기계장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종합적인 단면계획을 수행한다.

3) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 설계자가 책임진다. 설계자는 입찰단계, 시공단계, 발주기관에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성한다.

라. 공사비 산출

1) 설계자는 실시설계를 진행하면서 지속적으로 공사비를 검토하고, 만약 공사비 한계를 초과할 경우에는 설계자는 비용절감 대안을 공사비 범위 내에서 의견을 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 설계자는 총공사비 산출서를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

4		설계지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행은 건축법, 건설산업 기본법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술 진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지 개발이용보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통정비촉진법, 장애인노인임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

나. 본 과업은 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시 제2021-981호)에 의거 수행하여야 한다.

다. 상기 기준(국토교통부 고시 제2021-981호)의 제24조(설계도서 작성기준)는 건설공사의 설계도서 작성기준에 의거하여 작성한다.

라. 설계자는 본 과업지시서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주청에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

마. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계자는 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반시 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준/ 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 설계자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 설계자는 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

가) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제51조

나) 엔지니어링산업진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

다) 건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

라) 건설엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무요령

마) 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

2. 설계 일반 지침

본 설계지침은 참고기준으로 작성된 것으로 설계자가 본 설계지침의 내용보다 더욱 발전적인 계획(안)을 제시할 경우 관계기관과의 협의를 거쳐 수용할 수 있음.

가. 납품은 중간설계 및 실시설계도서(검토용 도서 별도)로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서, 검토서 제출, 현장 회의 등) 하여야 한다.

다. 발주청의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주청의 요구에 응해야 한다.

라. 설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 수요를 감안한 아동친화적 시설 설계

1) 아동친화적이고 당진시 원도심과 어울리는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

사. 에너지 절약형(Energy Saving) 건축물 설계

1) 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」, 「건축물의 에너지절약 설계기준」등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

2) 창호, 내외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) 「효율관리기자재 운용 규정」 및 「고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정」을 준수하여 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계를 하여야 한다.

4) 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」 제12조 제2항 및 「신‧재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」(산업통상자원부 고시) 및 「신‧재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」을 준수하여 신‧재생에너지 설비를 설계하여야 한다.

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도를 계획한다.

6) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

아. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

자. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

차. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주청과 협의하여 선정한다.

3) 내진설계 및 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 제품을 우선적으로 반영하여야 한다.(조달청 우수제품, 신기술제품)

6) 건축물의 요구 성능 만족을 위해 부득이하게 특정자재를 사용하게 될 경우에는 특정자재 사용목록을 [붙임8]의 양식에 따라 작성하여 승인을 받아야 한다. (특정자재 사용목록은 관급자재 선정검토서 제출 시에 별도 제출)

카. 하도급의 범위

1) 설계자는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 기계설비, 전기․정보통신, 소방, 토목, 인테리어 등의 설계업무

나) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

다) 건설공사의 수량 및 견적업무

라) 기타 발주청에서 특별히 인정하는 업무

3) 설계자는 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 설계자는 하도급한 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

타. 공사중 발생할 수 있는 민원에 대비하여 착공 전 철저한 공사관리계획을 수립할 수 있도록 공사시 발생할 수 있는 피해를 최소화할 수 있는 방안을 계획하여야 한다.

3. 설계 세부 지침

가. 건축 및 인테리어 계획

1) 이용행태의 특성상 반드시 수직이나 수평으로 인접 배치하지 말아야 할 시설 간의 공간관계를 고려한다.

2) 시설은 관리 및 통제가 용이하며, 최소 인원으로 운영, 관리가 가능한 경제적인 시스템 도입 설계가 되도록 한다.

3) 시설의 보수 등 시설물 유지관리에 필요한 장비반입 등이 가능하도록 계획에 반영하여야 한다.

4) 창고공간을 충분히 고려하며, 적절히 분배하여 배치하도록 계획한다.

5) 각 열람공간은 직사광선을 차단하면서 자연광의 밝기는 최대한 활용할 수 있도록 좌석배치를 고려한다.

6) 이용자 편의를 위한 원스톱 서비스 제공을 위해 안내데스크 설치하도록 설계에 반영한다.

7) 색온도와 용도를 고려한 종합적인 조명계획 반영하되, 간접조명 최대한 활용하여야 한다

8) 내진보강을 위한 철골구조물을 인테리어 디자인에 자연스럽게 통합하여, 기능성과 미적완성도를 동시에 고려해야한다

나. 가구계획, 사인계획, 색상계획

1) 당진시 육아종합지원센터는 원도심과 조화를 이룰 수 있도록 사인계획, 가구계획, 색상계획 등을 포함하여 계획하되, 실내공간의 인테리어 구성을 위하여 사인 시스템 및 가구디자인이 계획되어야 한다.

2) 공간 프로그램을 계획하고, 각 공간의 기능과 성격에 따라 색상계획을 하되 일정한 패턴을 유지하여야 한다.

다. 구조 계획

1) 경제성, 시공성, 안정성 등이 확보된 구조계획을 수립하여야 한다.

2) 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀히 검토하여 구조계획을 하여야 하며 건축법 및 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙준 등 건축구조 관련규정에 적합하게 하여야 한다.

3) 구조물에 사용성 및 내구성 기준 이상의 균열이 발생하지 않도록 구조계획을 설계에 반영하여야 한다.

4) 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 기존 건축물의 구조안전진단 결과(당진시 육아종합지원센터 구조안전진단 보고서 참조)를 반영하고 구조보강을 고려하여 설계에 반영하여야 한다. 리모델링 중 하중조건과 공간구획 변경 시 반드시 구조 안전을 확인하여야 한다.

라. 기계설비 계획

1) 일반사항

(1) 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화할 수 있는 설비방식으로 계획한다.

(2) 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며, 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

(3) 기계, 전기, 통신, 소방 등 각각의 설비가 유기적으로 조화를 이루어 서로 원활한 기능을 유지할 수 있는 시스템을 도입 계획한다.

(4) 자동화된 운전관리를 통하여, 업무효율의 극대화 및 인력 절감을 꾀할 수 있도록 계획한다.

(5) 에너지 및 수자원 절약을 극대화할 수 있는 최적의 설비방식을 추구한다.

(6) 화재, 수재, 재난과 지진 등 비상 상황에 대응할 수 있도록 계획한다.

(7) 기계실 및 전기실은 합리적인 장비반입계획을 반영한다.

(8) 쾌적한 환경조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화, 시공성 향상 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타공종과 협의하여 설비설계를 계획한다.

2) 기계․소방설비

(1) 건물 실별 용도에 적합한 환경계획과 LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여 경제적으로 계획한다.

(2) 아래 규정, 기준 등에 따라 에너지절약 관련사항을 적극 수용하여 계획한다. (각종 인증은 과업수행 시 시행 중인 해당법규의 기준에 따라 적용·설계한다)

- 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부고시 제2022-52호)

- 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」(산업통상자원부고시 제2021-166호)

- 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증기준」

(국토교통부고시 2020-374호, 산업통상자원부고시 제2020-133호)

- 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」등

(3) 쾌적한 환경조성을 위하여 합리적·경제적 설비시스템 계획, 오염물질 배출 최소화 등을 고려하며, 관련법규 및 제반규정을 준수하고 타 공종과 협의하여 설비설계를 계획한다.

(4) 모든 설비계통은 품질 및 성능을 신뢰할 수 있는 신기술, 신공법(국토교통부 인증)을 적극적으로 활용하고 최신 시설과 신제품의 자재, 품질관리, 철저한 안전시공, 예산절감 등을 고려하여 계획한다.

(5) 환기시설은 실별로 경제성 및 유지관리 측면을 고려하여 계획을 수립하여야 한다.

(6) 통신실 등은 광통신설비를 고려하여 충분한 면적을 확보하여야 하며, 선로 및 장비보호를 위하여 별도 접지시설을 갖춰야 한다. 또한, 장비를 고려하여 실 상부에는 물 사용 장소가 없도록 하되 냉난방 시설을 설치 시 피해방지 시설을 계획하여야 한다.

(7) 다수의 인원이 사용할 수 있는 대강당 등은 음향, 영상설비를 계획하고, 명료도 확보를 위하여 음향 설비를 고려한 마감재를 선정하여 실별로 차음, 흡음 및 방음 조치를 하여야 한다.

(8) 기타 언급되지 않은 사항은 설비공사 표준시방서(국토교통부)기준으로 설계한다.

(9) 에어컨실외기, 엘리베이터실, 기계실 등 소음발생이 많은 시설물과 맞닿은 공간의 벽은 소음차단 설계가 되도록 한다.

(10) 배수 및 통기관 설비는 중간 막힘 현상이나 악취, 역류현상 및 배관 내의 흐름을 원활히 하도록 고려하여야 한다.

(11) 소화설비 공사는 화재 발생시 인명과 시설물을 안전하고 철저하게 보호하기 위한 소방설비를 고려하여야 한다.

(12) 전기, 통신, 상․하수도등 건축설비 및 냉․난방시설을 효율적으로 배치하여 에너지 절약형 설계가 되도록 계획한다.

(13) 유사시 인명피해를 최소화하고 건물의 안전성을 확보할 수 있도록 계획한다.

(14) 각 실의 용도별 소방설비, 내진설계 기준에 적합하도록 계획한다.

(15) 각 실별로 적절한 환기방법을 검토하며, 자연환기와 강제 배기를 병행 가능하도록 검토 설계한다.

(16) 「실내공기질관리법」에 따라 다중이용시설의 실내공기질 유지기준을 준수하고 포스트 코로나대응(비대면수업의 특성에 맞는 시설 및 장비) 및 감염병 등의 관리 차원에서 기계실 환기설비 또는 환기창 확보하여 공기오염에 대비할 것.

마. 전기·통신·소방 계획

1) 전기계획

(1) 전기설비는 최적의 시스템으로 구성하여 안전성·신뢰성·기능성·경제성·미래지향성 등에 중점을 두어 계획하고, 에너지절약 뿐만 아니라 최상의 시설환경이 조성될 수 있는 시스템을 계획한다.

(3) 가구 배치 영역에 맞춰 조명기기 설치 위치를 설정하여야 하며, 전기 및 통신 계획은 각 용도실별 최적화된 자동화시스템으로 설계에 반영하여야 한다.

(4) 소방, 전화 등의 부하 설비는 운영관리, 시공 및 사후 관리보수 등의 편리성을 감안하며 용도, 계절성, 설치장소 등을 분류하여 합리적인 방법을 택하여야 한다.

(5) 사무실의 전기, 전화, TV, OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획한다.

(6) 자동제어 설비는 중, 대규모 건물에 적합한 용량으로 단일기능은 물론 종합적인 시스템까지 수행하도록 계획한다.

2) 통신분야

(1) 모든 정보통신설비는 신뢰성·기능성·안전성·경제성·에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종으로 설계하여야 한다.

(2) 모든 정보통신설비는 운영 및 확장이 용이하도록 하여야 하며, 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

(3) 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하여야 하며, 방송설비, CCTV설비, OA설비(정보서비스, 문자처리, 안내, 관리, 일반사무처리기능 등)등을 시설하여야 한다.

(4) 세미나실 등은 행사 등의 시설운영을 고려하여 이에 따르는 AV설비를 계획에 반영한다.

3) 소방분야

(1) 소방법에 근거한 소방시설 대상 및 규정을 빠짐없이 설계에 반영하여야 한다.

(2) 유사시 신속한 피난이 가능하도록 비상 경보장치, 유도등, 비상 유도 통로 등의 위치를 적절히 선정할 것이며 비상시에도 안정된 전력이 공급되도록 설계한다.

(3) 전기소방 등 소방설비에 해당하는 모든 제품은 최신사양 및 관리가 편리하여 비전문가도 누구나 작동 및 정지를 할 수 있게 한다.

(4) 화재의 수평, 수직의 확산을 방지하기 위하여 마감 재료의 불연화 및 방화구획 등을 검토하여야 한다.

(5) 피난 유도설비는 비상시 유효 작동 여부, 사용법 명시, 성능 유지관리, 피난 유도의 조직화 등 관리 면에서 효율화를 기하여야 한다.

바. 기타 계획

1) 에너지 관련분야

(1) 녹색건축 인증기준(국토교통부 고시 제2023-329호, 환경부 고시 제2023-172호)에 따른 적용등급 이상

(2) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」 제12조, 동법 시행령 제15조 및 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」(산업통상자원부 제2022-175호)에 의하여 설계에 반영

(3) 건축물에너지절약설계기준(국토교통부 고시 제2023-104호) 반영

(4) 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2021-166호)반영

(5) 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」제9조 규정에 따라 신재생에너지의 공급의무 비율 이상이 될 수 있도록 설계하여야 하며, 「건축물에너지효율등급인증기준」에 따라 적용등급을 취득할 수 있도록 설계하여야 한다.

2) 장애인 관련분야

(1) 각종 편의시설 및 위생시설(화장실)은 장애인을 포함한 모든 사용자가 편리하게 사용할 수 있도록 계획하여야 하며, 「장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」및 동법시행령 규정에 따라 편의시설 종류 및 시설기준에 맞게 설계한다.

(2) 유니버설 디자인으로 누구나 이용이 편리하도록 계획한다.

3) 방범 및 보안계획

(1) 출입구 및 방범 취약지역을 중심으로 CCTV(사각지역이 없도록 하여야 함)가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제시스템 구축 등 효율적인 방범․보안계획을 수립하고, 무인경비시스템이 가능한 시설을 갖추어야 한다.

(2) 국토교통부 고시 제2021-930호「범죄예방 건축기준 고시」를 준용하여 건축물의 범죄예방기법을 적용하여 설계하여야 한다.

4. 설계도서의 분리작성

가. 건축(기계설비 포함), 인테리어, 구조, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요시 작성 전 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 필요시 공사비 내역서는 발주기관의 연차별 예산 현황에 맞춰 차수 분리하여 공사계약이 가능하도록 발주기관과 협의하여 작성하여야 한다.

다. 건설폐기물 내역 도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

5. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약일 반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 인테리어도면 : I

3) 건축구조도면 : S

4) 토목도면 : C

5) 조경도면 : L

6) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

7) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

8) 통신도면 : ET

6. 도면작성

가. 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 건축, 인테리어, 구조, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 도면은 발주청의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능 하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 완료

보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수 공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

5		설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설계 도서명	규격	수량	단위	비 고
1	계획설계(안)	A3	3	부
2	관련법규 검토서	A4	3	부
3	공사비 검토서	A4	3	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 설계공모 심사위원의 지적사항, 공공(총괄)건축가 자문사항 및 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영) 결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종						비 고
					건축	인테리어	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전문, 관급시방포함
6	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	3	부							해당시 제출 (발주기관과 협의)
7	제로에너지건축물 인증 관련 검토서	A4	3	부							해당시 제출 (발주기관과 협의)
8	건축물 에너지효율 인증 관련 검토서	A4	3	부							해당시 제출 (발주기관과 협의)
	장애물 없는 생활환경예비인증 관련 검토서	A4	3								해당시 제출 (발주기관과 협의)

※ 건축도면에는 건축, 구조도면을 포함하여 제본한다.

※ 인테리어, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 제출목록 전부를 USB저장장치로 제작하여 제출

※ 납품 수량은 필요시 발주처가 추가 요구 가능하며, 설계자는 이에 협조하여야 한다.

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종												비 고
					건축		인테리어		기계		전기		통신		소방
1	완료보고서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		1부로 작성
2	설계도면	A3	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
3	계산서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
4	내역서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		ETS파일 포함
5	관급내역서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
6	수량산출서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
7	단가산출서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		견적서 포함
8	일위대가표	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
9	일반시방서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
10	특기시방서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
11	관급시방서	A4	5	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯
12	투시도(조감도)	A3	3	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		내부투시도 포함
13	CI 계획 및 내부색채계획도	A3	3	부			◯
14	공정표		1	부	◯		◯		◯		◯		◯		◯		전공종 포함
15	USB저장장치		2	SET	◯		◯		◯		◯		◯		◯		계획/중간/실시/각종심의/인허가관련/문서/회의록/각종발표자료 등 포함
16	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등															공사개요, 현장설명서 포함
17	에너지 절약계획서 검토 관련 증빙서류																해당시 제출 (발주기관과 협의)
18	녹색 건축물 예비인증서																해당시 제출 (발주기관과 협의)
19	제로에너지건축물 예비인증서																해당시 제출 (발주기관과 협의)
20	건축물 에너지효율등급 예비 인증서																해당시 제출 (발주기관과 협의)
21	장애물 없는 생활환경 예비인증서																해당시 제출 (발주기관과 협의)
22	설계안전검토보고서, 설계안전보건대장																해당시 제출 (발주기관과 협의)
23	주요 자재 선정 설명서	A4	2	SET	◯	◯		◯		◯		◯		◯		◯	제품명, 색상, 규격 등 포함
24	기타 발주청 요구사항				◯	◯		◯		◯		◯		◯		◯

1) 투시도(조감도)는 제출 시 별도로 A2 규격(표구 포함) 3매와 원본 File을 USB저장장치로 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 USB저장장치로 제작하여 제출

4) 녹색건축, 에너지효율등급 및 제로에너지 건축물 예비인증서는 수요기관과 협의 후 협의 시점까지 해당 인증기관 접수증 등으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 설계용역비 중 인증 관련 업무 대가의 지급을 유보할 수 있음.

나. 완료보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공사기간은 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 공사 준비기간, 비작업일수, 정리기간 등을 충분히 고려하여 산정하며, 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 USB저장장치에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주청 요구부수

1) 공사개요서는 수요기관의 총공사비 예산 및 당해연도 공사비 예산을 구분하여 작성하되, 건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물, 기타 예산을 예정공정표를 근거로 금차공사기간 및 금차공사금액을 추정 산출하여야 한다.

2) 현장설명서는 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 작성하여야 하며, 관급자재 선정내용 등을 정확히 기재하여야 한다.

마. 에너지절약 계획서 : 발주청과 협의

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

사. 기타 발주청이 요구하는 성과품

※ 납품 수량은 필요시 발주처가 추가 요구 가능하며, 설계자는 이에 협조하여야 한다.

6		예정 공정표

○ 설계기간 : 90일

구 분	과업 기간						비 고
	15일	30일	45일	60일	75일	90일
1. 일반현황 및 현장 조사
2. 설계도면 및 설계서 작성
3. 실시설계 검토 및 보완 (필요시 인허가 진행)
4. 최종성과품 작성 및 제출
5. 물품 검수 및 납품

〔붙임 1〕 위 치 도

사업부지 현황도

□ 대지위치: 충청남도 당진시 당진중앙1로 83(읍내동 524)

〔붙임 2〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                     공사 설계용역

2. 계약  일자 :      .   .   .

3. 착수  일자 :      .   .   .

4. 완수예정일 :      .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

202 년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

당진시장 귀하

〔붙임 3〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                      공사 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

당진시장 귀하

〔붙임 4〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                   공사 설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 202 .   .   .

4. 착수  일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

당진시장 귀하

〔붙임 5〕 (기본, 실시)설계 검사원

(중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                     설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 202 .   .   .

4. 착수일자 : 202 .   .   .

5. 완수예정일 : 202 .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

202 년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

당진시장 귀하

〔붙임 6〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                      공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(202 . . .)	금주예정사항(202 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

당진시장 귀하

〔붙임 7〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                      공사 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 202 년  월  일 ～ 202 년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (202 . . . ～ 202 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

당진시장 귀하

〔붙임 8〕 특정자재 사용 목록

특정자재 사용 목록

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   책임기술자  ○ ○ ○ 서명

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외