『무안 시니어친화형 국민체육센터 건립사업(리모델링)』기본 및 실시설계용역

제안공모 과업지시서

2025. 04.

-  목       차  -

제1장 설계 일반 사항

1. 설계용역 개요	1

2. 설계용역 필요사항	4

3. 설계용역 일반사항	4

제2장 설계 진행 사항

1. 설계도서 작성	8

2. 설계진행 시 제출서류	8

3. 업무보고 및 회의	10

4. 보안성 검토	11

제3장 설계 일반 지침

1. 일반사항	13

2. 분야별 설계일반지침	14

3. 설계도서의 분리작성	24

4. 설계도서 표기	24

5. 도면작성 및 서명	25

제4장 설계도서 작성요령

1. 계획설계	26

2. 중간설계	28

2. 실시설계	33

제5장 설계도서 납품목록	40

[서 식]

[서식 1] 보안 각서	43

[서식 2] 하도급 승인 요청서	44

[서식 3] 설계용역 참여기술자 현황	45

[서식 4] 주간 공정 보고	46

[서식 5] 월간 공정 보고	47

[서식 6] 책임기술자 선임계	48

[서식 7] [기본, 실시] 설계 검사원	49

[서식 8] 설계 예정 공정표	50

제1장 설계 일반 사항

1. 설계용역 개요

가. 과업명 : 『무안 시니어친화형 국민체육센터 건립사업(리모델링)』 기본 및 실시설계용역

나. 과업의 목적

고령자 인구증가에 따른 시니어층의 체육 및 여가 활동 수요증가로 본 사업을 통해 무안군 맞춤형 공공체육시설 조성으로 지역 시니어층의 건전한 여가활동 및 체육 활동공간을 제공함으로써 건강증진 및 삶의 질 향상을 도모하고자 함.

다. 설계 기간 : 착수일로부터 5개월(150일)

1) 본 과업의 기간은 착수일로부터 5개월(공휴일 포함, 심의‧협의‧인증 기간 제외)로 한다.

2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 연장할 수 있다.

가) 천재지변으로 인하여 과업수행에 차질이 있는 경우

나) 발주기관의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

다) 발주기관의 사업계획 변경 등으로 과업내용이 변경되었을 경우

라) 과업수행과 관련한 협의(협조)부서의 업무처리지연으로 과업수행에 현저한 차질을 초래한다고 발주기관이 판단할 경우

마) 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생되었을 경우

라. 시설 개요

1) 사업위치 : 전라남도 무안군 현경면 양학리 1165번지 일원

(무안종합스포츠파크 내 구 청소년수련관)

2) 부지면적 : 228,115.8㎡

3) 연 면 적 : 2,663.04㎡(±5% 내외)

4) 주 용 도 : 운동시설

5) 건물규모 : 지하1층 / 지상2층

마. 추정 공사비 : 3,500,000천원(부가가치세 포함)

1) 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등에 대한 총공사비이며 공종 간 배분하여 제시된 예산 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

2) 각종 분담금(상․하수도, 전기, 가스 등)에 대하여 사전 조사를 하여 해당 금액을 원가 계산서에 별도 표시하여야 하며, 발주기관이 부담하는 것으로 한다.

※ 예산액은 과업기간 내․외에 변동(증감) 될 수 있으며, 변동으로 인한 관계 개별 법령에 따라 자료작성․검토․보고 등 필요한 각종 서류는 발주청의 승인을 받아 수급인이 수행하여야 한다.

바. 설계 용역비 : 310,743천원(부가가치세 포함)

1) 설계 범위 : 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등

(리모델링 대가기준, 손해보험료, 부가가치세 등 포함)

2) 용역 범위

가) 본 과업은 “무안 시니어친화형 국민체육센터 건립사업(리모델링) 기본 및 실시설계용역”에 적용한다.

나) 본 과업은 무안군(이하“발주자”라 한다)과 “무안군 시니어 친화형 국민체육센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역”업자로 지정된 자(이하“수급자”라 한다)간 체결한 용역에 적용한다.

다) 수급자의 용역범위는 용역계약서 및 본 과업지시서에 의한 일체의 설계 도서 작성과 본 용역에 관한 각종 보고(회) 및 제출자료와 발주자가 필요하다고 인정하여 지시하는 사항을 시행한다.

라) 본 용역은 각 분야별 [건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 분야별 관련 자문 등을 포함] 설계에 해당된다.

마) 본 용역은 기본 및 실시설계, 지하1층 야외공간 공간계획 포함, 누수방지 대책, 구조안전진단, 장애인편의시설, 공간 구성을 위한 의견 수렴, 석면조사, 자문, 건축인허가, 건물해체신고 등이 포함된다.

사. 주요시설 구성(안)

구 분	세부시설	면적(㎡)	비율(%)	비 고
지하1층	스크린파크골프실	288	10.8
	휴게실	19.2	0.7
지상1층	사무실1	240	9.0
	사무실2	98.61	3.7
	휴게실	39.56	1.5
	탁구장	261	9.8
지상2층	운동처방 및 건강측정실	144	5.4
	근력단련실	67.2	2.5
	휴게실	39.56	1.5
	GX룸 및 회의실	261	9.8
공용공간	홀, 화장실, 계단실, E/V 등	830.42	31.2	안내데스크
	기계․전기실, 펌프실 등	374.49	14.1
	소계	1,204.91	45.2
옥내주차공간	지상주차장
	지하주차장
전 용 면 적		1,458.13	54.8
공 용 면 적		1,204.91	45.2
합 계(연면적)		2,663.04	100

※ 설계공모 대상 건축물은 리모델링 위주 사업으로 증축·개보수 이력은 없으나, 단순개보수, 내부 리모델링 공사 범위 외 외벽개선(단열강화, 창호공사, 방수공사 등)에 따라 구조보강 및 공사금액 상승 요인이 발생할 수 있으므로 구조안전에 지장이 없는 범위로서 공사비 내에서 사업이 가능하도록 설계 시 고려하여야 함.(구조안전진단 필수)

※ 건폐율, 용적률은 증가되지 아니하는 범위에서 각 세부시설별 전용면적 및 배치는 기능 및 이용자 측면을 제시 가능하나 필요시 전체 연면적 범위 내(연면적은 ±5%를 초과)하지 않도록 할 것)에서 설계자가 자유롭게 조정하여 계획할 수 있으며, 향후 설계시 발주청과 협의하여 결정함.

- 권장시설: 스크린파크골프장 등 고령친화 체육시설

2. 설계용역에 필요한 사항

가. 주변경관 및 환경과 조화되고 지역의 이미지를 부각시킬 수 있는 창의적인 외관과 경제적인 구조, 합리적인 기능을 충분히 반영하여 계획한다.

나. 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영한다.

다. 지역 주민과의 화합·융화를 도모하는 친환경적이며 지속가능한 에너지절약형 공공건축물을 계획한다.

라. 급변하는 사회여건의 변화에 부응할 수 있는 가변성, 융통성 있는 공간 구성과 관리자의 시설물 관리 및 운영, 유지관리의 편의성을 도모하여야 한다.

마. 부지이용의 효율성을 최대한 높여 지역주민과의 커뮤니티 활성화를 위한 주민편의시설 및 외부공간을 계획하여야 한다.

바. 시설 이용계층을 고려하여 모든 시설은 노약자와 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 동선, 편의시설 설치 등 종합적인 계획을 수립하여 반영하여야 한다.

사. 인테리어 디자인을 통하여 건축물 내에 실별 배치 및 디자인이 조화될 수 있도록 한다.

3. 설계용역 일반 사항

가. 설계 용역의 정의

본 설계용역의 최종도면은 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법, 소방 관련법, 지적법, 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 녹색건축물 조성 지원법, 환경․교통․재해 등에 관한 영향평가법 등 기타 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없고, 조례를 충족하여야하며, 관계기관과의 건축협의가 완료된 것이어야 한다.

나. 납품

1) 납품은 기본설계 및 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

2) 설계 납품 전에 관계법령에 해당되는 모든 행정절차[설계 관련 심의, 건축 협의 승인, 실시계획인가, 계약심사, 건축물에너지효율등급(1++등급)예비인증, 제로에너지건축물(5등급)예비인증 등〕이행 후 반영될 사항은 최종성과품에 반영하여야 하며 이에 소요되는 비용은 도급자와 협의하여 부담한다.

※ 이용자의 특성과 편의를 고려하여 각 시설 기준을 BF인증(일반)기준에 준하여 설계에 적용한다

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자 등으로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법 제20조 (업무상의 성실의무 등) 제2항 등에 의한 손해배상 책임을 진다.

2) 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축인허가 불가, 구조적인 모순, 주요물량 누락 등)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계 변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 공사 착수 및 시행 시 관련기관에 제출 하는 설계도서 및 관련서류를 무대로 재작성 제출하여야 한다.

3) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 대하여 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 하며, 설계의도 구현을 위해 설계지원업무를 해야 한다.

4) 발주처의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응해야 한다.

라. 건축법 및 관련법규 검토

설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하고 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련 기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용 한다.

마. 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 설계의 기본방향 및 개요

1) 대지의 입지조건에 적합하게 합리적인 설계를 하여야 한다.

- 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 주변건물과 조화롭게 설계

- 대지가 안정성 있도록 하여야 하며 구내도로, 공동구, PIT 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영

- 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계

2) 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설로 설계한다.

- 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로, 외관은 조형성, 독창성 있는 설계로 쾌적한 단지를 조성

- 전화 및 LAN 구축으로 충분한 통신회선 반영 및 공공시설의 내부망 사용을 고려하여 외부망과 혼선이 오지 않게 설계

- 내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변과 조화롭게 설계

- 전기 및 정보통신(LAN 등) 분야는 미래 지향적인 기술기준을 적용

- 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 적용

3) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계로 계획하여야 한다.

- 설계자는 에너지절약에 영향이 큰 주요 장비, 자재, 공법에 대하여는 에너지효율검토서(2개 이상 대안을 검토 내용에 포함)를 작성하여 발주기관에 제출하고, 발주기관이 선정한 안을 설계에 반영

- 에너지효율검토서는 공법ㆍ시스템 선정 등은 기본설계 시, 재질ㆍ규격 등은 실시설계 시에 제출하여 설계에 반영

- 에너지절약형설계의 기본 방향

․ 창호, 내 ․ 외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열, 결로 등 에너지절약형 구조로 설계

･「건축물의 에너지절약설계기준」 제2조(건축물의 열 손실방지 등) 및 제13조   (에너지절약계획서 및 설계 검토서 작성), 건축물의 에너지절약설계기준에 적합한 설계

․ 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

․ 자연채광을 최대한 반영하고 적정 환기로 실내환경을 최적화하고 건물용도와 실에 따른 적정 조도를 반영

․ 열손실이 적으며, 에너지 효율의 극대화를 이룰 수 있는 설계

․ 신에너지 및 재생에너지 사용 적정성 검토

․ 신재생에너지 공급 의무 비율을 준수한 설계

4) 환경친화적 부지환경을 조성한다.

- 우수, 지하수, 태양열 이용 등 환경친화형 설계를 위한 구상 방안을 제시하고 환경친화적 건축물로 설계

- 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 환경조성

- 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수 계획 기타 시설은 환경친화적으로 설계

- 기존대지의 수목 및 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

5) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이해야 된다.

- 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계

․ 시설 및 설비는 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

․ 자재 등은 유지관리에 소요되는 소모품이 적게 들어야 하고, 보수용 자재를
쉽게 구입할 수 있는 것이어야 한다.

․ 각 시설의 설비별로 관리․보수용 점검구, 통로(사다리 등) 작업공간 등을 확보
하여야 한다.

․ 구조설계시 적용된 적재하중을 명시하고, 각종 마감설계시 주요 구조부재를
수시로 점검 및 조사할 수 있도록 개폐가 자유로운 점검구, 통로 또는 마감 방법을 강구하여 실시설계에 반영한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고,
방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

6) 안전성과 시공성이 확보된 설계

- 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

7) 기본설계 시 친환경계획, 신기술, 특허, 저탄소배출 등의 공법 등을 설계에 적극반영  하여야 하며, 발주자에게 적용에 따른 품질, 환경, 안전 등과 소요 예정공사비 등을 비교하여 제출하고 협의하여야 한다.

8)  공사중 발생하는 민원에 대비하여, 착공 전 철저한 공사관리계획을 수립할 것

- 무안종합스포츠파크 내 차량용 도로가 막다른 길로 인해 공사 차량의 진·출입으로 교통 민원이 예상 되므로 보행자를 위한 별도의 통행로를 확보할 것

- 공사장 펜스 및 가림막 등 가설물 설치, 자재 적재 등으로 보행도로가 점용되지 않도록 공사장관리에 유의할 것

- 사업대지 인근이 농림지역이므로 농지에 피해가 발생하지 않도록 유의할 것

- 향후 시설 이용 차량의 원활한 이동을 위해 게이트볼장 옆 도로 추가 확보를 검토할 것

사. 관급 및 주요자재 등

1) 직접구매 대상품목으로 지정된 품목은 발주자와 협의하여 현지 생산공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

2) 주요 자재 사용계획

- 기능에 적합한 환경친화적인 자재, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

- 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정하며, 사용 자재 및 시공방법 등을 검토하여 선택한다.

아. 기존시설 철거비

1) 철거 규모와 범위(외벽, 마감재 등)를 포함한 계획을 구체적으로 수립하여 철거비용을 산정할 것

2) 폐기물 처리에 소요되는 비용이 누락되지 않도록 유의할 것

3) 석면공사 대상일 경우를 대비하여 석면조사비용은 산정되어 있으나 석면철거비 외 석면조사비 및 석면철거감리비가 누락되지 않도록 유의할 것

자. 본 공사의 시설비와 시설규모 및 대지면적은 수요기관의 사정으로 추후 변경될 수 있으며, 용역계약자는 수요기관의 변경 통보가 있을 경우 별도의 대가 요구 없이 이행하여야 한다.

차. 계약상대자는 본 과업지시서와 건축설계공모 설계지침서(현장설명서 포함) 및 관계법령, 제규정에 따라 성실하게 과업을 수행해야 하며, 관계기관 사업계획승인(협의)·심의 및 인증, 계약심사 등의 행정절차를 수행하여야 한다. 단 인허가 및 심의 등 행정절차 이행에 따른 지연 시 추후 협의에 의해 계약기간을 조정할 수 있다.

제2장 설계 진행 사항

1. 설계도서 작성

가. 설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정양식에 의하고 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주자와 협의한 후 후속 작업을 진행 한다.

나. 본 과업지시서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행하여야 하며,   발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면 질의 후 후속 작업을 진행 한다.

2. 설계진행 시 제출서류

가. 용역 착수 시

1) 착수계 2부

2) 책임기술자 선임계

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황

(재직증명서, 기술자격증 사본, 기술경력증명서 등)

4) 설계용역수행 조직표

5) 설계용역 예정공정표(기본, 실시설계의 납품예정일자 명시: A3규격)

6) 계약금액에 대한 산출내역서

7) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 15일 이내 제출) 현황

8) 보안각서 및 청렴서약서 (보안계획서 작성 포함)

9) 계약자(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 기술자격증사본, 기술경력증명서, 재직증명서 등

10) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 계획설계(안) 제출 시

1) 계획설계 작성 방법에 따라 계획설계(안)에 대하여 설계지침에서 정한 사항

2) 기본계획안 제출

3) 관련법규 검토서 3부

4) 현장조사 결과보고서 3부

5) 유사시설 견학보고서(필요시)

6) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

다. 중간설계 제출 시

1) 중간설계 작성 방법에 따라 계획설계(안)에 대하여 설계지침에서 정한 사항

2) 중간설계검사원

3) 내역서(개략공사비)

4) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

5) 구조계산서

6) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항(세부 내용 납품목록 참조)

라. 실시설계 제출 시

1) 종합보고서

2) 실시설계도서

3) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

4) 건축 인⋅허가 또는 협의(사업계획승인)서

5) 실시설계의 경제성 검토 보고서 및 관련자료

6) 설계검사원

7) 총사업비 검토내역서(공종별 감리내역서, 각종 용역비, 공사비 등 근거자료 포함)

8) 산업안전보건법령에 따른 ‘설계안전보건대장’제출

9) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따른 신재셍에너지 계획수립 및 설비 설치계획서(한국에너지공단 검토 승인)

10) 손해배상보험증권(보증기간은 공사준공까지 산정)

11) 건설기술진흥법에 따른 설계안전검토보고서

12) 에너지절약 계획서 자료

13) 각종 예비인증서 및 관련 증빙서류

14) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항(세부 내용 납품목록 참조)

마. 기타 서류

1) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2) 총사업비 지침에 따른 설계 적정성 검토를 위한 도서(계획/중간/실시)

3. 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

가. 업무보고

1) 주간 공정보고

매주 월요일 오전10시까지(협의 후 변경가능) 붙임 “서식 5”에 의거 제출한다.

2) 월간 공정보고

매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 “서식 6”에 의거 매달 첫째 월요일까지 제출한다.(주간 공정보고 포함)

3) 수시 보고

설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 발생 시마다 제출하여야 한다.

4) 계획, 중간, 실시설계 단계별 중간 및 완료보고회

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업지지서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성   있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 하며, 별도로 회의록을 작성(녹음파일 및 출력물, 출력물은 반드시 서명필) 제출하여야 한다.

마) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지정/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

- 업무착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

- 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 하며, 관계자의 질의에 답하여야 한다.

3) 중간 보고회

- 설계자는 기본설계 완료 후 7일 이내에 발주기관과 사전협의를 거친 후 설계  보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

- 중간 보고회는 책임기술자가 기본설계 내용을 토대로 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

4) 최종 보고회

- 설계자는 용역완료 15일전에 발주기관과 사전협의를 거친 후 최종보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

- 최종보고회는 책임기술자가 실시설계를 토대로 설계의 전반적인 내용을 설명  하여야 한다.

5) 수시회의

- 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해관계자 회의. 각종 심의 및 자문회의를 할 수 있으며, 설계진행 중 문제점이 발생하거나, 기본설계 및 실시설계 보고회의 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

- 계획설계 및 실시설계 중 공사비가 공사예산을 초과할 시에는 필히 전 공종 담당자 및 견적 담당자가 합동회의를 통한 감축방안 및 원가의 적정성 검토보고서를 제출하여야 한다.

6) 기타회의

- 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 주민설명회, 이해관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 회의를 개최 할 수 있으며, 이때 설계자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

- 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에 별도 통보할 수 있다.

4. 보안성 검토

가. 설계자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 설계자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계 제출 시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리해야 한다.

4) 과업수행자는 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계자가 진다.

5. 설계의 하자(설계누락) 책임

“수급자”는 설계상의 하자(누락 등)로 인하여 설계 및 시공(설계변경) 시 공사비 등 증액, 인명의 피해, 기타 공사 진행 상 상당한 지장을 초래하였을 때에는 계약기간 만료 이후에도 관계 법령에 따른 처벌(부실벌점 부과 등) 및 설계서 작성, 수정 등에 따른 모든 비용 부담을 진다.

7. 용역 성과의 소유

“수급자”가 제출한 모든 용역성과는 “발주자”의 소유로 한다.

8. 계약조건

발주자에서 다음과 같은 조건이 발생되면 계약을 해약할 수 있다.

가. 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

나. 용역계약 조건을 위반할 때

9. 변경 및 정산

가. 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 설계용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 설계용역자는 발주자의 방침에 따라야 한다.

나. 과업범위의 현저한 변경 없이 설계용역 결과 과업제시기준 공사비를 초과한 범위의 과업 또는 수급자의 귀책사유로 인한 과업 범위의 증감이 발생할 경우는 용역비의 증액 지급이 불가하다. 다만, 발주자의 요구에 의해 과업범위에 증감이 발생할 경우에는 “설계용역 설계예산서”에 따라 당해 계약금액을 조정 또는 정산할 수 있다.

10. 기타사항

가. 본 과업에 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 동등 이상의 기술자를 발주자의 승인을 받아 교체하고, 발주자에 의해 과업수행에 부적합하다고 판단된 기술자에 대해 발주자가 즉시 교체를 명할 수 있으며 “수급자”는 이에 따라야 한다.

나. 분야별 세부사업계획 추진에 있어서는 업무 관련 부서와의 협의 및 심의를 받아 결정하여야 한다.

다. 본 과업지시서는 과업수행을 위한 일반사항을 규정하였는 바, 규정되지 않은 사항은 관련 법령과 각종 시방서에 의거 발주자와 협의하여 수행하여야 한다.

라. 과업수행에 필요하다면 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환 자료 등 최신 기술을 이용토록 한다.

마. 본 과업으로 인하여 “수급자”는 제3자에게 피해를 주었을 경우 “수급자”가 손실 보상하여야 한다.

바. 성과품 작성은 발주자와 협의하여 결정하고, 과업 완료 시 성과품을 작성 제출하여 업무담당자의 승인을 받아야 한다.

사. 과업지시 내용과 계약서의 내용이 상충되거나 의문이 있을 경우 발주자의 지시에 따라야 한다.

아. 감독 : 모든 설계과정에서 업무담당자의 감독을 받아야 한다.

자. 계속 자문 : 본 용역 수행자는 과업완료 후에도 본 과업과 관련하여 필요 시 자문에 응하여야 한다

제3장 설계 일반 지침

1. 일반사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신, 폐기물, 기타 부대공사에 대한 설계는  관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

라. 사전조사를 철저히 하여 지반상태 및 기존건축물을 확인하고 기존 도로 등과 연계하여 설계해야 하며 사전조사 시 도로의 연결관계, 지반상황(지하 또는 지상의 지장물 포함), 우․오수관 위치, 급수인입점, 전기인입점, 통신선 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 확보 수집, 검토하여 설계에 반영하여야 한다.(현황측량 자료 발주처 제공)

마. 본 사업과 관련하여 특별히 고려하여야 할 사항

1) 주 사용자인 시니어층을 고려한 건축 계획

2) 사업성 향상을 통한 편리하고 실용적인 실내체육관 건립을 위하여 실용성, 경제성 편리성, 기술성이 확보되어야 할 것.

3) 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방안 등을 고려한 경제적인 설계 및 유지  관리계획서 작성

바. 주차장은 진⋅출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.

사. 장애인 등에 대한 편의시설은 법에서 정한 기준 이상으로 설계하여야 한다.

아. 자재 및 장비선정 시 설계의 의도를 벗어나지 않는 한 신기술제품, 조달청 우수  제품 등의 사용을 검토하여야 한다.

자. 시설의 이용자가 다양하므로 도로에 면한 경계부를 외부 휴게공간 및 보행광장 등의 오픈스페이스와 연계하여 조성하고, 보행로 조성시에는 도로 단면의 연속성, 보도의 적정 유효 폭 확보여부 및 적정 기울기를 계획 초기부터 면밀히 검토한다.

차. 공사에 필요한 가설전기 및 가설 사무실을 계획하여 건축내역에 반영한다.

카. 기타 발주기관 요구사항을 면밀히 검토하여 반영하여야 한다.

2. 분야별 설계일반지침

가. 건축

1) 건축설계 일반사항

가) 건물의 배치

① 응모자는 현장을 답사하여 현장 조건을 조사한 후 현장 부지조건을 고려하여

토지이용률 및 시설 이용의 효율성을 극대화할 수 있도록 계획한다.

② 이용자 및 방문자의 접근성과 편리함, 안전성을 고려하여 배치한다.

③ 건물의 배치는 자연 조망, 채광, 환기를 고려하여 쾌적한 환경이 조성되도록 한다.

④ 진입로는 차량용 동선과 보행자의 동선을 분리하고 충분한 보도폭을 확보하여야

하며 부지의 이용을 극대화하여 용도 및 지역의 필요성에 따라 주차공간의 적절

한 배치 및 녹지공간의 확보에 노력한다.

⑤ 대지의 형상 및 지형지물 배치에 적극 고려한 조망을 확보하여 이용자의 만족성을 제고한다.

⑥ 차량 진출입 시 외부 보행자들의 동선을 고려하여 간섭을 최소토록 계획하고

도로와 건물을 이격하여 진입부에 여유로운 전면공간을 확보할 수 있도록 설계하

며, 부지 안에서의 보행자와 차량동선은 분리.

⑦ 출입구의 위치는 대지의 형태, 방위, 특히 도로와의 관계에 따라 결정하며, 규모,

이용자와 관리자, 보행자와 차량의 동선을 고려해 2개의 출입구를 분리 배치함

⑧ 각종 편의시설 및 위생시설은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진에 보장에 관한 법률」 등에서 정한 기준에 적합하게 설계한다.

⑨ 기계설비, 기계소방 P/D실(파이프덕트실)은 준공 후 설비시설의 유지관리가 가능

하도록 구획하고 출입이 가능 하도록 한다.

⑩ 기계실 또한 각종 설비규모의 바닥면적을 계산하고 장비기초(패드)가 누락되지

않도록 하며, 장비설치 공간이 협소하여 준공 후 시설보수 등 유지관리가 어렵

지 않게 여유 공간을 확보한다.

⑪ 외부공간은 차량의 이동을 최소화 할 수 있도록 도로를 계획하고, 차량과 보행자

와의 접점을 최소화하도록 한다.

⑫ 기타 발주자와 협의를 통한 요청사항을 반영한다.

나) 평면계획

① 실의 형태 및 위치는 실의 사용 용도에 적합해야 하며 배치(장․단변비)는 에너지 절약, 채광, 통풍, 환기 등을 고려하여 적합하게 계획한다.

② 공유할 수 있는 공간은 최대한 같은 존으로 계획하고, 가변적 공간모듈을 적용하여 가변성, 확장성을 고려한 공간계획을 해야 한다.

③ 평면은 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등의 새로운 이미지를 느낄 수 있도록 계획하며, 실내 공간 활용의 효율성을 도모하도록 한다.

④ 장애인과 노약자 등의 이용을 충분히 고려한 동선계획과 단위공간(장애인용 화장실 등)을 계획

⑤ 건축물의 원활한 순기능 및 쾌적한 실내환경 조성과 이용자의 편의를 고려한 적정 공용면적을 확보하여 제안한다.

⑤ 건축물의 원활한 순기능 및 쾌적한 실내환경 조성과 이용자의 편의를 고려한 적정 공용면적을 확보하여 제안한다.

다) 입면계획

① 에너지의 효율성 및 유지관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다.

② 설계의 기본개념을 부각시킬 수 있는 상징성과 친근감 및 친환경성을 고려하여 계획하여야 하나, 과도한 입면 및 불필요한 입면장식을 지양한다.

③ 에너지 절약 및 유지관리를 고려한 창호계획 및 주변의 경관과 조화되는 색채계획을 수립해야 한다.

라) 단면계획

① 실의 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 층고계획이 되도록 계획한다.

② 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평 동선을 계획한다.

③ 이용자의 편의를 고려한 동선계획으로 장애인, 노약자 등의 이동에 불편이 없도록 적합하게 계획한다.

④ 장비 및 물품 반출입에 있어 합리적인 기능성과 안정성이 확보되어야 하며, 원활한 이동이 가능하도록 동선계획을 수립하여야 한다.

⑤ 스포츠 활동이 가능하도록 충분한 층고를 확보한다.

마) 주차계획

① 충분한 주차공간을 확보하고, 공공시설로서의 기능을 충분히 활용할 수 있도록 계획한다.

② 주차장은 군관리계획 및 개발계획, 주차장법 및 건축법 등을 감안하여 법정대수 이상 확보하여야 한다.

③ 주출입구와 보행동선 및 연계성을 고려하고, 장애인 주차장은 출입구 인근에 배치하여 사용에 지장이 없도록 계획한다.

⑤ 차량 및 주차장의 진출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 한다. 또한 교통영향에 따른 유도설비 등의 충분한 설치를 통해 보행자의 안전을 확보한다.

⑥ 자전거와 전동휠 등 이륜차 이용을 고려하여 보관소를 확보(자동차 주차대소의 20%)하고, 보관소는 우천에 대비하여 건물과 직접 연결되는 곳에 설치한다.

⑦ 총 주차면의 5%범위 내 전기차 급속 충전시설을 설치한다.

바) 외부공간 계획

① 고령의 이용자들의 다양한 활동을 위해 내부공간과 외부공간의 연계 중요하게 계획하고, 심리적으로 안정감을 줄 수 있는 자연친화적인 외부공간을 계획한다.

② 지역의 특성과 주변 환경을 고려한 식재를 계획하고, 지형조건과 경제성, 시공성을 고려해서 지반환경에 순응하는 토목설계를 해야 한다.

③ 지역주민의 쾌적한 시설이용을 위해 충분한 면적의 조경공간을 확보하고 지역주민이 자유롭게 접근하여 휴식할 수 있는 기능도 고려한다.

④ 인도 및 야외 마당의 바닥은 투수성 재료를 사용하여 친환경적 외부 공간을 계획한다.

2) 구조계획

가) 건물의 골조는 건물의 기능, 규모, 경제성, 안전성 시공성 등을 검토하여 가장 합리적인 구조방식을 선정한다.

나) 지진에 대비한 내진설계를 하고 법에서 정한 규정을 반드시 지켜야 하며, 각 실의   기능을 고려하여 충분한 하중을 견딜 수 있는 구조로 계획한다.

다) 지질조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

라) 구조계산은 객관성이 있는 국내외 관계 규준을 적용하여야 하며, 적정성 여부에 대한 발주기관의 승인을 득한 후 구조 계산에 착수하여야 한다.

마) 구조 안전은 관계법에 따라 전문가의 확인을 받고, 사용하는 건축 재료의 품질은 관계법에 따라 공인된 것이어야 한다.

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용 한다.

나) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

다) 관급자재 및 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영한다.

라) 사후관리의 효율성을 고려하고 에너지를 절감할 수 있도록 계획할 것

- 유지관리에 용이한 마감재와 용도에 맞는 색채 선택으로 편안하고 쾌적한 내·외부공간을 조성할 것

- 고령의 이용자를 고려하여 공용공간 내 소음이 확산되지 않도록 각 층별 흡음 가능한 소재 적용을 권장

- 이른 오전 및 주말 이용이 가능하도록 행정기능과 동선 및 공간·설비 구성 분리 고려할 것

- 과도한 사업비 증가가 수반되는 외장재 표현을 지양할 것

4) 향후 시설 운영활용 계획

가) 고령자의 신체적 특징을 고려한 내부 계획 필요

나) 일반 건축물보다 밝은 실내 조도(채광 및 조명계획)를 확보할 것

다) 모든 안내문의 서체 크기 확대, 영문 사용을 자제할 것

라) 비상시 응급활동이 원할하도록 비상동선 계획 바람 (ex. 구급차 접근동선, 엘리베이터 크기, 전층 화장실 모든 칸막이마다 안전손잡이 설치)

5) 기타 유의사항

가) 공사비는 예정 총공사비 이내로 계획하여야 한다.

- 합리적인 개·보수(전기, 소방, 하수 등) 방향을 설정을 위해 충분한 현황조사 및 진단을 선행할 것

나) 에너지절약 등 차원에서 전체벽면이 유리로 된 커튼월 구조는 지양한다.

다) 납품이후 각종 행정절차에 따른 자료작성 등 업무협조 및 설계하자 관리방안을 제시하여야 한다.

나. 토목

1) 일반사항

가) 현장의 자연적인 지형조건 검토, 부지, 옹벽 및 성토 조형성과 경제성을 합리적으로 계획한다.

나) 본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

다) 설계에 임하기 전에 설계자는 반드시 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인 여건 및 장래계획, 배수 상황 등 제반 주변 사항을 조사하여 경계를 확정하고 조사 내용은 기본설계에 반영 한다.

라) 일반 토목 설계 법규 및 지침, 건축허가 협의사항 등을 준수하여 설계에 반영하고, 토공사로 인하여 주변 건축물 및 시설물에 대한 피해가 발생되지 않도록 주변현황을 철저히 조사하여 안전성을 검토 후 이에 대한 조치를 전문기술자가 확인하여 설계에 반영하여야 한다.

마) 획일적 설계를 지양하고 현장 상황에 부합되고 현실적으로 사용되는 경제적인 토목공종, 장비 및 자재 선정으로 적정한 품질확보와 경제적 설계가 되도록 한다.

바) 사전에 지질, 지반 및 지하구조물 등의 제반 여건을 면밀히 조사하여 구조 계산에 반영하여야 한다.

사) 상⋅하수도 계획 수량을 충분히 고려하여 설치되어야 한다.

2) 토공사 및 흙막이 설계

가) 토공은 가급적 절토, 성토량이 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치  하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

나) 설계자는 토공설계 군 토취장 또는 사토장을 토석정보공유시스템을 이용하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

※ 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치의 검토를 충분히하여 경제적인 설계 및 대안을 수립하여 설계하여야 한다.

다) 건설기계 선정시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

라) 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

마) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지질조사 결과 또는 학회 발표자료 등 객관적 근거를 기초로 작성하여야 한다.

바) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여서는 계측기의 종류 및 설치 수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

사) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주자와 감독관과 협의하여 결정하여야 한다.

아) 본 대지는 건물의 부동침하가 발생치 않도록 하여야 한다.

자) 토질의 화학적 특성을 감안하여 내부식성 말뚝을 선정하고 부득이 강관 말뚝을 선정할 경우에는 양호한 방식 대책을 강구하여 설계에 반영하여야 한다.

차) 말뚝박기공사에 따른 소음, 진동, 분진 등에 의한 주변지역의 민원을 최소화 할 수 있는 최신 공법을 적용한다.

카) 붕괴, 파괴, 과대한 변형을 방지할 수 있게 안전하게 설계하고, 공기가 최소화 되도록 경제적으로 설계하여야 한다.

3) 구내 우 ․ 오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록   하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150㎜ 이상이 되도록 한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

바) 우⋅오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

사) 환경부 제정 하수도 시설기준에 의하되 기존 배수시설을 충분히 조사한 후   우⋅오수량 추정과 배수방식 및 유량계산을 실시하고 설계 시 사업시행에   차질이 없도록 하수도 관리청과 사전 협의하여야 한다.

5) 도로 및 포장 설계

가) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와  유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

다) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

라) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

6) 상수도

가) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

나) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

다) 상기에 명시되지 않은 사항은 수도법 및 환경부 제정 상수도 시설기준에 따른다.

7) 기  타

가) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

나) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

다) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호 방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

라) 사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영한다. 필요시 토량이동 계획도를 작성한다.

마) 토목공종은 사고사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위해 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계 시 반영하고 아래의 내용을 포함하도록 한다.

- 지반굴착 및 흙막이공법 적용구간 안전대책

- 구조물 시공 시 안전대책

- 우기 및 동절기 안전대책

- 유지관리 종합안전 대책 등

다. 조경

1) 일반사항

가) 부지의 특성과 토양 및 주변 수종 등을 감안하여 설계에 반영하여야 하며 조경은 상호 이질감이 없도록 건물의 성격에 조화되도록 한다.

나) 보도, 차도의 성격을 구분하여 중복이 없도록 효율적인 체계를 확립한다.

다) 오염에 강하고 계절감이 있는 수목구성으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

라) 병충해, 전정, 동절기 보온 등 유지관리가 용이하고 해수에 강한 수목을 선정 한다.

마) 조경관련 시설물 등에 대하여는 위치, 규모, 재료, 수량, 내구성, 질감, 구조 등을 충분히 고려하여 디자인하고 이용자의 휴식 등을 위한 인공구조물을 설치하되, 주변지형, 단지내 지형, 시설물 등과 조화를 이루도록 한다.

바) 외부공간은 이용자의 정서 함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이   가능한 친숙하고 편리한 공간으로 구성하며 충분한 휴식공간과 녹지를 확보 하여 조성한다.

2) 조경수목

가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 조경수 식재구역의  토사를 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

다) 단지 내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

라) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 충분한 이격거리를 확보하여야 한다.

마) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

3) 조경시설물

가) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

나) 산책로 또는 조경 포장이 있는 경우에는 친환경적인 재료로 기존 시설 및 자재와 융합이 이루어지도록 사용하여야 한다.

다) 벤치, 등의자, 파고라 등 시설물은 해당지역의 조례에 의하되 주민들의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

라) 필요에 의하여 옥상정원 조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 구조안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려 하여야 한다.

라. 기계설비

1) 기계설비 일반사항

가) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.

나) 기본조사(급수, 가스, 오폐수처리시설 등)를 하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 냉난방 설비, 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주자의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

라) 각종시설은 중앙집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영, 관리가   가능하도록 설계한다.

마) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방안 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 기계설비 일반지침

가) 냉난방 설비

- 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

- 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.

- 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 용이하게 설계함을 원칙으로 한다.

- 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

- 동파방지 및 결로 방지에 대한 대책을 강구하여 설계에 반영한다.

나) 위생설비

- 급수, 급탕방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영한다.

- 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

- 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

- 위생기구는 K.S. 제품 또는 동등 이상 품을 사용한다.

다) 소화설비

- 소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물안전관리법 등의 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

- 소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계한다.

라) 자동제어설비

- 자동제어설비는 각 건물 규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요 장비에 대한 제어 등 운영관리 상 필요한 각종 자료의   지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 설계함을 원칙으로 한다.

마) 장비 성능을 최상으로 유지, 에너지절약, 소음방지 등을 위한 T.A.B를 반영한다.

바) 기타 관련법규 및 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 하며, 세부설계지침은 발주자와 협의한다.

사) 승강기는 장애인용과 겸용으로 한다.

아) 기계설비 반입구를 반드시 계획한다.

자) 장애인⋅노인⋅임산부 등의 편의증진에 관한 법령에 적합토록 설계한다.

마. 전기설비

1) 전기설비 일반사항

가) 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

나) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

다) 각 시설물의 용량 및 설비를 검토한 후 전기설비기술 기준에 적합하게 설계  하여야 한다.

라) 한국전력공사와 협의 고품질의 전력을 공급하기 위한 한전인입분담금 및 전기 사용전검사 수수료를 산출한다(순수공사비에서 제외  수요기관 부담)

마) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

바) 각 설비별로 내진 대책을 세워 반영한다.

2) 전기설비 공종별 지침

가) 수전설비

- 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

- 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

- 한전전원 인입점(수급지점) 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

- 전산 및 정보통신 기기 공급용 무정전 전원장치 (U.P.S) 및 비상 전원에 대한 예비전원과 간선 구성을 검토 반영한다.

나) 동력공사

- 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정하여야 한다.

- 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

- 역률보상 방법과 계통을 검토한 후 역률개선용 콘덴서를 부착하는 방안을   설계에 반영한다.

- 동력제어반의 형태와 구성, 설치 공간 등을 검토한 후 설계 반영한다.

다) 조명설비공사

- 조도 기준 설정 및 조도 계산서를 작성하여야 한다.

- 용도에 적합한 등기구를 선정한다.

- 에너지 절약형 등기구 선정 및 배치

- 각 실별 천장 재료에 걸맞은 고효율 에너지절약형 조명기구를 선정하고, 적정한 조도를 유지 할 수 있도록 등수를 검토 설계한다.

- 옥외 보안등의 설치 높이를 4.5M 이하로 한다.

- 옥외주차장, 부지 외곽 보안등은 현지 여건에 알맞게 계획되어야 하며, 야간의 내･외부 조명에 대하여도 검토 반영하여야 한다.

- 계단은 인체 감지형으로 보행자가 있을 때만 점등되도록 설계하여 에너지절약을 기하여야 한다.

라) 전열공사

- 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

- OA System에 부응하는 안정된 전원공급 방안을 검토하여 반영한다.

- 대기전력 차단시스템 검토

마) 피뢰침 및 접지설비

- 피뢰 및 접지설비는 관련법에 의거 설치한다.

- 피뢰방식 및 기타 건물보호를 위한 구체적인 방안을 검토 설계한다.

- 피뢰침의 보호각을 검토하여 설계한다.

- 전산용 접지는 1종 단독접지 또는 공통접지로 접지저항을 최소로 한다.

- 전기시설 접지와 통신 방송시설 접지는 시설의 안전을 위하여 충분한 이격  거리를 확인 설치할 것.

바) 소방설비공사

- 자동화재 탐지설비는 타 설비와의 관계를 검토 설계한다.

- 수신기 및 기타 발신기 등을 검토 설계한다.

- 소방 관련법에 적합한 설계를 하여야 한다.

(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등)

- 각종 소화설비에 따른 감시 및 유지관리의 편의를 도모하여야 한다.

바. 정보통신

1) 일반사항

가) 시설 및 사무실의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다.

나) 유지관리의 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다) 설계시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

라) 설계시 장래 시설확장에 대한 고려를 하여야 한다.

2) 정보통신 일반지침

가) 통합배선설비공사

- 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

- 통신실의 설치조건 및 위치를 검토하여야 한다.

- 통합배선 구성방식 및 전화/LAN 수구 적정수량을 검토하여야 한다.

- MDF/IDF(필요시) 위치 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

- 정보통신시설(필요시)은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

- 유지보수가 용이하도록 설계하여야 한다.

- 기타 관련법에 정하는 설비 검토 설계 및 위반됨이 없이 적용

나) 약전설비공사

- 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

- MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

- 향후 위성방송설비의 사용에 대한 인프라구축을 검토 설계한다.

- OA기기, 집무형태의 변화 등 모든 상황에 대응 가능한 설비로 구성

다) 기타설비

- 출입통제설비 및 CCTV설비는 수요기관과 협의하여 적정설비 설계가 되도록 한다.

- 기존 통신장비의 재사용 및 호환여부 등 수요기관에 필요한 정보통신설비는 협의하여 적절하게 반영하여야 한다.

※ 기타 건축설계공모 지침에 명기된 설계지침 내용을 충실히 반영한다.

3. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 기계설비, 조경 포함), 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 공종별로 분리   하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출서 등)

나. 발주단위에 대하여는 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다. 폐기물처리도서 분리여부는 발주자와 필히 협의하여 결정하여야 한다.

4. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

공 종	건축	건축구조	토목	조경	기계	전기	통신	소방기계	소방전기
기 호	A	S	C	L	M	E	ET	MF	EF

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 사용자재의 설치 상세도 작성후 관련 평면도에 명기

3) 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

4) 각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명기

5) 각종 부착물 및 부품에 대한 명시

6) 특수공법에 대한 공인기관의 기술검토 보고서 첨부 및 설명서(상세도)의 작성

7) 도면이해를 위한 주기사항 및 시공시 유의사항을 명시

8) 부호, 방향 KEY PLAN, GRAPHIC SCALE, ROOM NAME 등

9) 계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

10) 계통설명도

11) 수량집계표

12) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

13) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

14) 기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

5. 도면작성 및 서명

가. 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한  축적으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종합보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 구조도면 및 구조계산서에는 구조기술자가 필히 서명, 날인하여야 한다.

제4장 설계도서 작성요령

1. 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 기획업무 내용에 따라 현장조사 및 자료 수집내용을 근거로  건축물의 규모, 예산, 기능, 품질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 단계로 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등)의 기본시스템을 검토하여 발주기관의 요구조건을 반영한 계획(안)을 발주기관에 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반 사항

1) 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 수급인은 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행 하고 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완 제출하여 발주  기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 계획설계(안) 작성시 포함 사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선  계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변 도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치 계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리 계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경 계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 측량성과도

9) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(국내·외 유사시설 조사 분석자료 등)

라. 현장조사 방법

1) 현장조사는 관련 문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원,  등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하 매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장 조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관  하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리 방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시  기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위 경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사 보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

2. 중간설계

가. 정의

- “중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라  함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주 기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을  제시하여야 한다.

4) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조   계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주  기관의 승인을 받는다.

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패  사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 공사비 산정

※ 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비 관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면 종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공 방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리 계산서

- 구조계산서 (옹벽, 가시설)

- 수리계산서

- 절(터파기)⋅성토 사면안정성 검토서

다) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

라) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간 설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입 방식 및 인입 지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

3. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 계획설계 및 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계 도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질,  질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고  최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정  하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 용도, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률,  주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

엘리베이터 대수, 오수정화조규격 및 용량

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황, 기존건축물 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등(축척 : 임의)

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도, 단위 평면도

- 각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 각 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 계단 평 ․ 단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥 ․ 보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

2) 토목

가) 설계설명서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행내용, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 시방서

라) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

3) 조경

가) 설계설명서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행내용, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계설명서

냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비에 대한 설명

- 수전 설비도에 대한 채택 설명 : 전력인입에 대한 경제성 및 안전성에 대한  검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 계산기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수변전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서(필요시)

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법,   주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수전설비도 : 수전설비의 평면도(결선 포함)

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로   표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의  사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로,통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의  계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등  통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

7) 소방

가) 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 설비풍량계산서, 소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획(기본)설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	3	부	신재생 에너지 적용계획 포함
2	현장조사보고서	A4	3	부	유사시설견학보고서 포함
3	관련법규 검토서	A4	3	부	전공종
4	공사비 검토서	A4	3	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 설계공모 심사위원의 지적사항 / 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영) 결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 USB로도 제작하여 제출

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 (반접이)
3	내 역 서 (관급내역서)	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
4	계산서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시방서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방 포함

※ 기본설계보고서, 설계도면 및 내역서는 전 공종 포함 전체본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종합보고서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반책
4	각종 계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	일반시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	유지관리지침서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
14	조감도		1	부	◯							표구 포함 (0.9m*1.2m이상 1부)
15	공정표		3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
16	USB		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
17	건축물 에너지 절약계획서 및 관련 증빙서류
18	설계안전성검토보고서
19	설계안전보건대장											해당시
20	신·재생에너지 설비 설치계획서											해당시
21	기타 발주기관 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

※ 1. 조감도는 제출시 별도로 A1 규격 1매와 원본파일을 USB로 제출

2. 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주시 별도 제작 제출

3. 계약심사 제출용도서 및 계약심사 결과를 반영한 발주용도서 제작 제출(기타 발주기관 요구사항)

4. 위 제출 목록 전부를 USB로 제작하여 제출

나. 종합보고서

종합보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격으로 제출

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성하여 종합보고서에 포함하여 제출하여야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구 부수

마. 조감도(A1 이상, 표구 포함)

바. 기타 발주자가 요구하는 성과품

[서식 1] 보안 각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :

2. 계약  일자 : 2025 .   .   .

3. 착수  일자 : 2025 .   .   .

4. 준공예정일 : 2025 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로써 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 관련 법에 의하며, 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2025년       월         일

업   체   명 :

생 년  월 일 :

기 술  분 야 : (참여공종 표기)

성        명 :                   (인)

무 안 군 수 귀하

[서식 2] 하도급 승인 요청서

하도급 승인 요청서

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 : 금                 원(금                     원)

3. 계약  일자 : 2025.   .   .

4. 착수  일자 : 2025.   .   .

5. 완수예정일 : 2025.   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타(              ))

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임  1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게 (           )분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건

제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2025년       월         일

계   약   자

주        소 :

상        호 :

대   표   자 :                   (인)

무 안 군 수 귀하

[서식 3] 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황

설계용역 참여기술자 현황

□ 용 역 명 :

□ 용역기간 :

분 야 별	참 여 기 술 자					비고
	참여업무내용	참여기간	성 명	주민등록번호	자격증번호

[서식 4] 주간 공정 보고

주간 공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역기간 :

□ 용역진행사항

구분	전주진행사항 (20 . . .)	금주진행사항 (20 . . .)	비 고
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		(실시/예정공정)
익월	- 문제점및 해결책 등 표기

2025년       월         일

계   약   자

주        소 :

상        호 :

대   표   자 :                   (인)

무 안 군 수 귀하

[서식 5] 월간 공정 보고

월간 공정 보고

□ 용 역 명 :

□ 용역기간 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2025. . . ～ 2025. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

2025년       월         일

계   약   자

주        소 :

상        호 :

대   표   자 :                   (인)

무 안 군 수 귀하

[서식 6] 책임기술자 선임계

책임기술자 선임계

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 2025.   .   .

4. 착수일자 : 2025.   .   .

5. 준공예정일 : 2025.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가

수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2025년       월         일

계   약   자

주        소 :

상        호 :

대   표   자 :                   (인)

무 안 군 수 귀하

[서식 7] [기본, 실시] 설계 검사원

[기본, 실시] 설계 검사원

1. 용 역 명 :

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 2025.   .   .

4. 착수일자 : 2025.   .   .

5. 준공예정일 : 2025.   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

[기본, 실시] 설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2025년       월         일

계   약   자

주        소 :

상        호 :

대   표   자 :                   (인)

무 안 군 수 귀하

[서식 8] 설계 예정 공정표

설계 예정 공정표

구 분	착수일로부터 -150일																비고
	15일		30일		60일		90일		120일		150일		180일		210일
1. 현황조사 및 측량
2. 계획설계
3. 기본설계
4. 실시설계
5. 각종 심의, 협의 등																	행정절차 이행 소요기간은 용역 정지 또는 기간연장
6. 기 타

무 안 군 수 귀하