- 문경 매봉 국민체육센터 건립 기본 및 실시설계 -

과업지시서

2025. 7.

	문 경 시 (새마을체육과)

-  목         차  -

제1장 과업의 내용

1. 과 업 명	1

2. 과업목적	1

3. 과업개요	1

4. 기본지침	2

5. 과업범위	3

6. 참여자격	3

제2장 과업추진 세부사항

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	4

2. 업무보고 및 회의	5

3. 설계에 사용하는 재료	7

4. 에너지절약형 건축물 설계	8

5. 장애물 없는 생활환경 인증	8

6. 보안성 검토	8

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	9

2. 설계 일반 지침	9

3. 설계진행 시 유의사항	10

4. 설계도서의 분리작성	11

5. 설계도서 표기	11

6. 도면작성	12

제4장 기술지침

1. 공통 사항	13

2. 분야별 지침	13

제5장 설계도서 작성요령

1. 공통 사항	25

2. 계획 설계	25

3. 중간 설계	27

4. 실시 설계	34

제6장 설계 성과품의 제출

1. 계획 설계 성과품 납품	41

2. 중간 설계 성과품 납품	41

3. 실시 설계 성과품 납품 및 제반사항	42

【부록】

[붙임 1] 보안각서	49

[붙임 2] 설계검사원	50

[붙임 3] 주간공정보고	51

[붙임 4] 월간공정보고	52

[붙임 5] 협력기술자 보고	53

[붙임 6] 설계도서 작성시 유의사항(건축)	55

제1장 과업의 내용

1. 과 업 명: 문경 매봉 국민체육센터 건립 기본 및 실시설계

2. 과업목적

본 과업지시서는 “문경 매봉 국민체육센터 건립”을 위한 설계용역과 용역수행자의 업무범위 및 기타 용역 수행에 필요한 기술적인 사항 등을 규정하여 최적의 시설 건립을 도모하는 등 당해 과업의 적정한 수행을 목적으로 함

3. 과업개요

가. 과업내용

1) 대지위치: 경상북도 문경시 모전동 505번지

2) 대지면적: 10,773㎡ - 도시계획시설(체육시설) 구획 내

3) 용도지역: 도시지역, 자연녹지지역, 종합운동장

4) 규    모: 총 연면적 830㎡내외 (법적 용적률 100%이하)

(총 연면적 ±3%, 세부시설 ±5% 이내 조정 가능)

5) 조성규모: 국민체육센터(지상4층), 주차장 등

6) 건축물 용도: 국민체육센터(운동시설)

※ 건물규모 및 주요시설은 참고 사항으로 발주기관 및 주민협의체 의견 등에 따라 예산범위 내에서 조정 가능하므로 상호 협의 후 지시에 따를 것

7) 위치도 및 전경사진

<표1 - 위치도 및 현황사진>

위치도	현황사진

나. 추정공사비: 3,720,000,000원 (VAT포함)

1) 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방, 기계설비, 폐기물 처리 등에 대한 전체 공사비임.

2) 전체 공사비에는 각종 시설분담금, 법정 소요비용이 포함됨.

다. 설계용역 금액: 공고서에 따름

- 설계용역에는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방 분야 등의 기본, 중간 및 실시설계, 장애물 없는 생활환경(B.F.)인증, 설계안전보건대장, 건축협의(허가) 및 건축행정시스템을 통한 착공 전 착공신고 및 건축물 준공 후 건축물대장 작성 및 제출 등 제반 인허가와 본 공사에 해당되는 건축위원회 심의, 계약심사 등의 법적사항에 대한 모든 업무가 포함되며 설계용역비에는 인증 대행비용, 검토비용 등이 모두 포함됨. 단, 설계 및 인허가 과정에서 발생하는 기관 수수료(건축물 인증 포함)는 발주기관에서 부담한다.

라. 과업기간: 착수일로부터 6개월 (각종 인증 및 관련부서, 주민협의체, 전문가 의견 반영 협의기간 포함)

1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주기관과 협의 후 요구사항에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 감독관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

- 용역계약 일반조건에 따라 계약기간의 연장, 용역의 일시정지, 계약상대자의 용역정지, 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우 등

<표2 - 과업 공정표>

공정 공종	착수											준공
	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	175	180
주요 추진 일정	계획설계	중간설계			실시설계						최종보고
현장조사 및 기본/중간 설계
기본 및 실시설계
일상감사 및 계약심사
건축 인·허가 및 인증 취득
최종 성과품 납품

4. 기본지침

가. 본 과업은 “문경 매봉 국민체육센터 건립”의 설계용역에 적용한다.

나. 과업의 범위는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 상하수도 등 전 분야를 포함한 일체의 설계로 한다.

다. 본 과업의 범위는 건축 관련 법령 및 규정에 의한 공사에 필요한 설계도서, 시방서, 조감도 및 내역서(품셈 및 일위대가 포함)의 작성 및 각종 인․허가, 보고 및 심사에 필요한 자료작성을 포함한다.

라. 대지여건과 관련 자료를 충분히 검토 분석하여 건축물의 배치 및 용도지역 특성에 맞는 건립 방향을 결정하고, 건물의 형태와 내․외부 마감재료, 마감방법, 설비계획 등을 반영하고 미관성, 기능성, 친환경적 요소의 조화 등을 종합적으로 고려하여 설계하여야 한다.

마. 건립 관련 주민협의체 자문, 향후 사용 및 유지관리 부서의 의견, 감독관의 검토의견 등을 반영하여 기본설계(안)을 작성한다.

5. 과업의 범위

가. 본 과업은 “문경 매봉 국민체육세터 건립”의 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 관계기관 사전협의 및 각종 인․허가(건축협의 및 심의, 도로굴착, 철도보호지구 관련 신고, 전기·상하수도인입 및 정화조설치신고 등)에 필요한 서류작성, 제출, 제반 협의를 포함한다.

나. 건축․토목․조경․기계․전기․통신․소방 및 폐기물처리 등 전 분야의 설계지침에 따른 중간 및 실시설계도서를 작성한다.

다. 건축공사 허가, 착공, 준공도서(설계변경 시 이에 수반되는 도서 포함)를 작성한다.

라. 인허가 업무를 대행한다.

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 인허가는 수급인이 대행한다.

2) 본 과업의 각종 영향평가 등을 실시할 경우 수급인은 각종 용역업체와 협의하여 발주기관을 대행하여 처리한다.

3) 수급인은 향후 사용승인 시 준공도서 작성, 인장날인 등 업무를 수행한다.

마. 수급인은 주민설명회 등 각종 보고회 자료를 준비하고 보고한다.

바. 수급인은 사업추진 및 각종 위원회 자문, 심의 등에 대한 업무를 협조하고 지원한다.

사. 수급인은 현황 측량 및 지질조사(BX 2공), 표준관입 시험, 지질조사서, 흙막이검토보고서, 지내력시험보고서 등 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 도서 등을 작성한다. (해당 과업을 수행하는 비용은 발주기관이 별도 지급함)

아. 수급인은 기타 설계용역을 수행하는데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행하고 보고서를 작성한다.

자. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

제2장 과업추진 세부사항

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시에 다음의 자료 2 SET를 제출한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계[붙임 1] 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부

5) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

6) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

7) 설계용역 예정공정표 1부

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정 현황 1부(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출)

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

11) 보안각서[붙임 2] 각 1부(보안계획서 작성 포함)

12) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 착수계 제출 후 7일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 착수회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 수급인은 예정공정표에 따라 계획설계에 대하여 감독관과 사전 협의, 승인을 받아 수정, 보완한 후 아래의 계획설계도서를 납품한다.

1) 배치, 평면, 입면(안)

2) 세부제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 관련법규 검토서

4) 현장조사 결과보고서

5) 측량 성과도 (수행비용 발주처 부담)

6) 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

7) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 수급인은 예정공정표에 따라 중간설계에 대하여 감독관과 사전 협의, 승인을 받아 수정, 보완한 후 아래의 중간설계도서를 납품한다.

1) 세부제출도서는 제5장 납품목록을 참조

2) 중간설계도서

3) 지질조사보고서 (수행비용 발주처 부담)

4) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서

5) 건축물 인증 취득 관련 검토서 및 자료

6) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

사. 수급인은 예정공정표에 따라 실시설계에 대하여 감독관과 사전 협의, 승인을 받아 수정, 보완한 후 아래의 실시설계 도서를 납품한다.

1) 완료보고서

2) 세부제출도서는 제5장 납품목록을 참조

3) 실시설계도서 일체

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 건축물에너지효율등급, 제로에너지빌딩, 장애물 없는 생활환경 예비인증서

6) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

아. 기타서류

1) 용역의 진도보고

가) 주간공정보고[붙임 3]

나) 월간공정보고[붙임 4]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

가. 업무보고

1) 주요보고회

- 착수보고회: 3주 내외(설계공모내용 보완된 내용으로)

☞ 발주청 관계자 및 건립자문위원회 참석

- 중간보고회: 10주 내외(보고방식 및 일정은 감독관과 조율)

- 최종보고회: 용역 준공 3주 내외(최종설계안)

2) 주간공정보고: 매주 금요일에 붙임 양식에 의거 제출한다.

3) 월간공정보고: 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 제출한다.

4) 수시보고: 설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하여 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적, 보완, 수정 요구사항에 대하여 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획설계 보고회:

수급인은 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4) 중간설계 보고회:

수급인은 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

5) 실시설계 보고회:

수급인은 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

6) 수시회의:

설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성, 배부하여야 한다.

7) 기타회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

8) 업무보고 및 회의내용의 기록 : 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 요구 시 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 설계에 사용하는 재료

가. 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 따른 고효율에너지기자재를 사용한다.

나. 인체에 유해한 물질이 함유된 자재는 사용을 할 수 없으며, 가능한 친환경자재의 사용을 고려한다.

다. 관급자재의 선정

1) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률시행령」 제11조에 따라 중소기업청장이 지정, 고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매하도록 설계하여야 한다.

2) 설계자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재 LIST를 작성, 제출하여야 하며, 관급자재 선정을 위하여 각 자재에 대한 비교, 검토 결과를 발주청에 보고하고 승인 후 관급자재를 선정한다.

라. 제품선정에 있어 부득이하게 신기술 및 특허 등의 특정제품이나 공법을 사용하여야 할 경우, 유사 제품을 조사하여 비교, 검토하고 제품선정 사유를 작성하여 발주청의 사전 승인을 받아야 한다.

※ 특정제품이나 공법 사용(적용)시 사전에 별도의 절차를 거쳐야 하며, 임의로 특정제품이나 공법을 설계에 반영하여 설계도서의 재작성 등에 따른 용역 지연 등은 설계자에게 책임이 있음.

4. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정

2) 건축물의 에너지절약 설계기준

3) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. 본 조성시설은 냉난방면적 500㎡ 이상으로 제로에너지인증 대상임. (5등급해당)

5. 장애물 없는 생활환경 인증

가. 장애물 없는 생활환경 예비인증을 취득하여야 하며, 취득에 필요한 수수료는 발주처가 부담한다.

6. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다. (착수계제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

제3장  과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업은 「건축법」, 「건축서비스산업 진흥법」, 「건축사법」, 「건설기술 진흥법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「정보통신공사업법」, 「전기공사업법」, 「전력기술관리법」, 「소방공사업법」, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 「신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급 촉진법」, 「환경영향평가법」, 지자체 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령, 고시, 지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

나. 본 과업지시서가 관련법령 및 지침, 현장여건 등과 상충되는 경우 발주기관과 협의하여 그 결과에 따라 기본설계 및 실시설계를 수행하여야 한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건에 의거 지연배상금 조치를 하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 설계자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2. 설계일반지침 (설계세부지침은 설계공모지침서 참고)

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응하여야 한다.

라. 수급인은 「건축법」 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 「건축법 시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경 친화적이고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재를 사용한다.

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

사. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 다른 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 제도 및 도면작성 등 작업

라) 건설공사의 수량 및 견적업무

마) 구조계산 및 검토 등에 관한 업무

바) 기타 발주기관에서 하도급이 필요하다고 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급할 수 있으며, 수급인은 하도급된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

3. 설계진행 시 유의사항

가. 지질조사 BX 4공 등 사전에 위치 선정 등을 발주기관 담당자 승인 후 지질조사를 시행한다.(지질조사 후 결과보고서 제출, 내진설계 대상에 해당하는 경우 전단파 속도 측정 시행)

나. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.(조사항목: 공공시설물, 전기/통신/상하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타시설물)

다. 수급인은 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

라. 수급인은 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

마. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련 내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

바. 가 수준점(T.B.M.)을 부지 내 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

사. 수급인은 토공 설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토하여 반영한다.

아. 수급인은 「건설현장 축중기 설치지침」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

카. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함)를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석보고서의 오류로 설계변경이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중을 검토 후 관련법령에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사 분석을 하여야 한다.

타. 장애인 등에 대한 편의시설은 장애물 없는 생활환경 인증기준을 따른다.

파. 수급인은 각 분야별(건축, 토목, 조경, 설비, 전기, 통신, 소방) 실시설계 도서를 종합적으로 검토하여 향후 시공 시 분야별 도면 상이로 인한 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

4. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정한다.

5. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 용역계약 일반조건에 의한다.

나. 약어를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M(소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E(전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

6. 도면작성

가. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간에 중복(Overlapping)에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명·날인하여야 하며 완료보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등) 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

제4장 기술지침

1. 공통사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 에너지 절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

라. 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

마. 설계자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사 시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

바. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

사. 기타 발주자 측의 요구사항 반영

2. 분야별 설계지침

가. 건축 분야

1) 일반 사항

가) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

나) 장래의 시설확장(수직증축)에 대응할 수 있어야 한다.

다) 장애인을 위하여 “장애인, 노인, 임산부등의 편의증진보장에 관한 법률”등 관계법령에서 정한 시설, 규모 및 구조로 설계하여야 한다.

라) PD, AD, EPS, TPS, 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

마) 건축물의 재해를 방지할 수 있는 대책이 고려된 내진설계가 되도록 한다.

바) 지질조사 검토보고서를 참고하여 구조, 시공, 경제적인 설계가 이루어져야 한다.

사) 제반 부수 시설의 가구, 사인보드, 특수시설 및 기구 등은 그 종류, 필요위치, 소요개수 등을 면밀하게 분석 및 검토하여 실시설계에 반영할 수 있도록 충분한 계획 및 자료를 제시한다.

아) 건축물의 구조계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

자) 기타 세부계획 및 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주자의 해석에 따른다.

2) 구조계획

가) 시설 기능에 적합한 구조시스템을 도입한다.

나) 내진설계 등 제반 규정에 적합한 안전한 구조계획을 수립한다.

다) 공사비를 고려한 경제적으로 설계하여야 한다.

라) 대지의 지질조사 검토보고서를 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

마) 정확한 기초설계와 증축을 감안한 안전한 구조를 반영하여야 한다.

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주자와 협의하여 선정한다.

다) 부득이 수입자재 등을 사용 시에는 사전에 발주자와 협의하여 결정한다.

라) 관급자재 및 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

나. 토목 분야

1) 공통사항

가) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획 설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

나) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

다) 계획도면은 종합계획도를 작성하고 배수계통도, 포장 평·입·단면도, 하수계획도면을 세분하여 작성한다.

2) 측량 (해당 과업을 수행하는 비용은 발주기관이 별도 지급함)

가) 일반사항

(1) 측량조사는 기본설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성과 구조물의 안정성을 확보하는데 있다.

(2) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련 규정에 따라 시행한다.

(3) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 실시한다.

(4) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

(5) 발주기관이 서면 지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산한다.

(6) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

(7) 조사 내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

나) 조사측량

(1) 경계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 측량한다.

(2) 현황측량은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

(3) 측량면적은 사업경계선으로부터 주의의 여건 및 설계수행을 감안하여 결정한다.

(4) 측량일수는 측량면적, 축척, 지형조건, 인원수 등에 따라 표준품셈에 의하여 산정된 작업량을 기준으로 산정한다.

(5) 가 수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

(6) 조표는 임시용으로서 목항, 석항, 도로경계석, 노출암반 등을 측점표지로 사용하며, 위치는 기계 설치에 지장 없는 양호한 지반에 설치한다.

(7) 트레버스측량, 수준측량, 평판측량을 병행하며 지형표시는 등고선법으로 표시한다.

다) 표시항목

측량성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, 주변도로 도시계획도로선, 철탑 및 전주 등, T.B.M, 수로 및 농로 등, 지하구조물, 지하 지장물, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

3) 토공 및 흙막이 설계 (해당 과업을 수행하는 비용은 발주기관이 별도 지급함)

가) 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

나) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 기본 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

다) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성(Trafficability)을 확보토록 한다.

라) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

마) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지질조사 결과 또는 관련 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용근거를 첨부하여야 한다.

바) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

사) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

4) 구내 우․오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150～200㎜ 이상이 되도록 한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

바) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 한다.

사) 문경시 하수도정비 기본계획에 의거 설계하여야 한다.

아) 관종, 접합방법 등은 장·단점을 비교하여 발주처와의 사전협의 등을 거쳐 결정한다.

5) 도로 및 포장 설계

가) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 도로 및 주변광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

라) 지질조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 주변도로 및 포장 설계 시 P.P. Mat 및 PET Mat 등의 적용을 검토하여야 한다.

마) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

6) 상수도

가) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

나) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

다) 관종, 접합방법등은 장, 단점을 비교하여 발주처와의 사전협의 등을 거쳐 결정한다.

7) 주차장

가) 주차장의 구조는 차량주행 동선 및 통행차량 안전을 최대한 확보할 수 있도록 하여야 한다.

나) 주차장 형태 및 구조와 평면위치 및 계획, 주차계획, 진출입계획, 관리동의 배치 및 세부시설계획 등 주차장계획관련 전반에 대하여 용역과정 착수시 발주처와 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

다) 차량통행에 지장이 없도록 LED 조명시설을 하여야 한다.

라) 본 주차장은 안전, 내구, 기능, 경제, 시공성, 사후 유지관리 등을 고려하여 현지여건에 적합한 설계를 하여야 한다.

마) 주차장 평면배치 계획은 차로 폭원에 대하여 충분한 검토를 한 후 발주처와 협의 후 결정하여야 한다.

바) 주차장 설치에 사용되는 자재는 국내재료 사용을 원칙으로 하되 구조상 불가피한 경우 또는 국내생산이 불가능한 자내는 외자재를 사용토록 한다.

사) 향후 전기자동차보급으로 인한 충전시설설치를 법정기준에 맞게 계획하고  발주처와의 협의에 따라 설계에 반영한다.

8) 기  타

가) 부지 경계부근은 도로, 인접토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

나) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나, 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

다. 조경 분야

1) 일반 사항

가) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고 건물, 주차장 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물 주변환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

나) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

다) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게 공간, 수경 공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

라) 조경은 자연지형을 이용하여 계획하여야 하고, 가능한 기존수목을 이용하도록 한다.

마) 조경은 「문경시 건축조례」 등을 고려하여야 하고, 이용자 편의 및 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

2) 조경 수목

가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

다) 단지 내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

라) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 거리를 확보하여야 한다.

마) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

3) 조경 시설물

가) 벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등을 설치하는 경우 시설물은 관람객들의 이용이 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

나) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

다) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적인 재료를 사용하여야 한다.

라) 게이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성, 발주처와 협의하여 결정한다.

마) 시설안내 Sign, 각종표지판, 상징적 Sign, 준공석 표지석 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성, 발주처와 협의하여 결정한다.

라. 기계설비 분야

1) 일반 사항

가) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계하여야 한다.

나) 보수, 유지관리가 용이하여야 하며 장래 증설이나 변경․개보수 에 대한 적응성이 있어야 한다

다) LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화할 수 있는 설비방식을 고려한다

라) 자동제어, 단순 모듈화 등 다양한 방법을 통하여 업무효율 극대화 및 인력절감을 기대한다

마) 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적 설비방식을 선택한다

바) 냉난방설비, 환기설비, 공기조화설비, 위생설비, 소화설비 및 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주자의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

사) 신에너지 및 재생에너지 개발. 이용. 보급촉진법에 의한 적정 에너지 반영 및 설치계획 마련

아) 『친환경상품 구매촉진에 관한 법률』에 의거 친환경 상품을 사용하여야 한다.

2) 일반 지침

가) 냉난방, 환기 및 공기조화설비 설비

- 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 건물과 조화되고 설비가 차지하는 면적이 최소화되도록 설계하여야 한다.

- 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 하며, 사무실 등 상시 사용공간이 아닐 경우 별도의 조절 기구를 설계에 반영하여야 한다.

- 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 용이하도록 설계함을 원칙으로 한다.

- 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

나) 위생설비

- 급수방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영한다.

- 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

- 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

- 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

- 위생기구는 K.S. 제품 또는 동등 이상 제품을 사용한다.

다) 소화설비

소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

라) 자동제어설비

자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

마) 가스설비 : 건물 내 가스시설은 문경지역 도시가스 공급업체와 협의하여 시행한다.

바) 기타설비 : 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

마. 전기설비 분야

1) 일반사항

가) 에너지 절약형 설계를 적극 도입한다.(전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계)

나) 신재생에너지 개발. 이용. 보급촉진법에 의한 적정 에너지 반영 및 설치계획 마련한다.(에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 충족)

다) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 타 공종과 연관성을 고려한다.

라) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

마) 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

바) 최근 개정된 법령중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

2) 일반 지침

가) 수변전 설비

- 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

- 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

- 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

- 한국전력공사와 협의 고품질의 전력을 공급하기 위한 한전인입분담금 및 전기 사용전검사 수수료를 산출한다 (순수공사비에서 제외 : 수요기관 부담)

나) 동력공사

- 전동기의 용량에 알맞는 개폐기 및 전선굵기로 선정하여야 한다.

- 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

- 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

- 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

다) 조명설비공사

- 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

- 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 실폭 등을 고려하여야 한다.

- 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토하여야 한다.

- 건축물의 부분경관조명, 옥외가로조명, 부분연출조명을 고려 계획안을 감독원과 협의 결정한다.

라) 전열공사

- 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

- 용도에 적합한 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

마) 소방설비공사

- 소방 관련법령에 적합한 설계를 하여야 한다.(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등)

- 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여야 한다.

바. 정보·통신 분야

1) 일반사항

가) 본 설계는 정보통신설비의 시공관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을  지향하고 운용 및 확장이 용이하도록 하여야 하며 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

나) 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보 하여야 한다

다) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

라) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고 주요자재․공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

마) 모든 공사용 자재는 국산자재 사용을 최대한 고려하고 KS표시 중 1,2급으로 구분된 경우는 1급을 사용한다. 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 하며, 자재품질은 관련 KS 규격이상의 제품으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것을 사용하여야 한다.

바) 설계 시 방재, 보안에 대한 고려를 해야 한다.

2) 설계범위

가) 구내통신(통합배선)설비     나) 종합유선방송 및 TV공청설비

다) 전관방송설비              라) CCTV설비

3) 설계지침

가) 구내통신 선로설비(전화설비+LAN설비)

(1) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

(2) 기간통신사업자가 제공하는 일반전화 및 IP전화시스템이 수용가능하도록을 통합단자반 설비를 사무실 등 주요실에 설계하여야 한다.

(3) 정보통신시설은 기술기준을 준수하여 첨단시설로 설계에 반영한다.

(4) 국선인입관로 매설은 통신 사업자와 협의하고 통신사업자 맨홀에서 통신실까지 인입관로는 지중매설하며 수공맨홀을 시설한다.

(5) 장래의 다양한 통신, 정보시스템의 증가를 고려한 예비배관을 계획하여야 한다.

(6) 배관은 매입배관을 원칙으로 하며 부득이한 경우 노출 배관한다.

나) 공시청TV(MATV) 및 종합유선방송(CATV) 설비

(1) 공시청 설비 UHF/VHF, 종합유선방송(CATV)등 모든 방송이 양호하게  시청 될 수 있도록 시설한다.

(2) 증폭기, 분배기, 유니트는 쌍방향 수신이 가능한 형으로 한다.

(3) 각 실별로 최소 1개이상의 아울렛 UNIT를 구성해야 하며 UNIT 종단에서의 전계강도는 70dB 이상이 되도록 하여 양호한 화질과 음질을  얻을 수 있도록 하여야 한다.

(4) 안테나는 스테인리스제를 사용하며 안테나 지지용 기초는 독립기초를 사용하여 기계적 강도는 풍속 30m/sec에 견디도록 설계하여야 한다.

다) 전관방송설비

(1) 일반 안내방송, 층별, 단위별 방송이 가능하여야 한다.

(2) 소방법규에 의한 자동화재 탐지반 수신기와 연동하여 비상방송이 송출되어야 하며 비상방송 시 자동육성 대피 유도방송이 되어야한다.

(3) 옥내외 각 공간을 전체 또는 개별로 방송할 수 있도록 구성한다.

(4) 스피커 시설은 내/외부 구분 용도에 맞게 선택(천장, 벽부, 칼럼, 혼형)한다.

(5) 관리실에 방송실을 두고, 시설지 내 주요지점에 옥외 스피커를 설치하여 비상방송을 대비할 것.

라) 감시 및 출입관리 설비(영상감시 장치)

(1) 감시 카메라의 설치위치는 감시대상을 충분히 감시할 수 있는 적당한 위치여야 한다.

(2) 카메라는 4.0M 픽셀이상의 카메라로 설계하여야 한다.

(3) 모니터는 최소한 42“이상의 LED MONITOR를 사용하여야 한다.

(4) 녹화장치는 COMPUTER(NVR) 녹화장치로 하며, 착탈식 기록매체를 사용하여 녹화물 보관이 가능하도록 백업용 하드장치를 공급하여야 한다.

(5) 각 CCTV와 NVR은 연계구성은 Ethernet망으로 구성하여야 한다.

(6) 옥외 적절한 장소에 카메라를 설치하여야 한다.

제5장 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. ‘건축물의 설계도서 작성기준’을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계도서의 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 계획설계

아래의 계획설계 작성방법에 따라 설계공모 당선안을 기본으로 심사위원 보완의견 및 발주자의 의견을 반영한 내용으로 제출

가. 일반사항

1) “국토교통부 고시 설계도서 작성기준”을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 “기본업무 설계도서”와 본 과업을 위해 필요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

2) 수급자가 제출한 보완된 계획안이 부적합하다고 발주자가 검토의견을 통보시 수급자는 조속한 시일안에 새로운 대안을 재작성하여 제출하여야 한다. 그로 인한 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

3) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급자는 즉시 보완․제출하여 발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

나. 계획설계 수정 시의 제출 서류 (공모안에서 보완된 사항 위주)

1) 현장조사서

2) 설계계획 개요 작성

3) 대지분석

- 도시축, 향, 조망분석

- 토지이용계획

- 건축가능 영역

- 차량 및 보행자 동선

4) 주변도로망과 주차 진출입부, 내부 램프 등을 포함한 지상층 계획

5) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

6) 개략적인 평면 및 입면계획(입면형태는 주변과의 조화성)

7) 조경계획

8) 관련법규 검토서

9) 주민설명회시 제출된 의견(부득이 반영이 필요한 의견에 한함)

다. 조사 방법

1) 조사는 관련 문헌 및 서류조사 등과 현장조사를 병행하여야 한다.

2) 문헌조사

- 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부등본, 조례 등 특이한 사항을 모두 조사하여야 한다.

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

3) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지전경을 촬영보관하여야 한다.

- 주변과의 조화를 고려하여 주변 건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위 경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

※ 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

라. 측량조사방법

1) 일반사항

- 측량조사는 계획 설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

- 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

- 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급자가 설계 목적상 필요한 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 발주자의 승인을 득한 후 실시한다.

- 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

- 발주자가 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산할 수 있다.

- 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급자가 책임지며, 수급자 부담으로 이를 해결하여야 한다.

- 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급자는 이를 수급자 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

2) 조사측량

- 경계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 측량한다.

- 현황측량은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지 내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

- 측량면적은 사업경계선으로부터 주의의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주자와 협의 후 결정한다.

- 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

- 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

3) 표시항목

- 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하 지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

3. 중간설계

가. 정의

“중간설계”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계 도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받은 단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완설명서에 따라 작성한다.

2) 계획 설계 위치를 기준으로 지질조사 계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산 등 구조계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) 각종 설비 설치위치는 장비 레이아웃(Lay-Out)을 작성하여 발주자의 승인을 받는다.

다. 지질조사

1) 일반사항

- 지질조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, NX공수)와 기존 조사내용을 첨부하여 작성 발주자와 발주자의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

- 지질조사는 발주자가 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 발주자의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하며. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

- 수급자는 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 수급자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주자의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

- 지질조사 시 책임기술자를 상주하여 지질조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

2) 조사방법

- 지질조사는 계획 설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지질조사를 실시함을 원칙으로 한다.

- 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중∙장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 발주자의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

- 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 연암 2.0m이상까지 조사하며, 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야  한다.

- 수급자는 현장 지질조사, 현장시험 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시하여야한다

- 지하수위측정

ㆍ시추공내의 지하수위는 시추완료 후 일정시간 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 측정한다.

ㆍ지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.

- 토질시험 및 토질조사 등

ㆍ KS F(한국산업규격)의 의한 시험 및 조사

ㆍ기타 본 사업부지(지반)의 특성을 파악할 수 실험(물리시험,역학시험,화학시험,안정화시험,실내암석시험등) 등

- 시료상자정리: 시료상자에는 과업 명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하여 보관하여야 한다.

3) 지질조사 성과품

- 시료보관상자(75㎝×40㎝×6㎝ 이상) 및 시료

- 보고서는 A4 규격으로 좌철(무선무사철), 시추사진 및 전경 등 첨부되는 사진은 칼라를 사용한다.

라. 설계도서의 구성

1) 건  축

- 설계설명서

ㆍ공사개요: 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

ㆍ설계개요: 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

ㆍ현지조사: 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패사례를 조사․분석․검토 내용(반영사항 표기)

ㆍ계획설계내용

ㆍ사전조사: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

ㆍ시공방법

ㆍ개략공사비 산정

※ 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

ㆍ주요자재계획 및 기타 필요한 사항

- 구조계획서

ㆍ설계근거기준

ㆍ구조재료의 성질 및 특성

ㆍ제반 하중조건에 대한 분석

ㆍ각부 구조계획 : 골조의 평면, 간사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

ㆍ구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 시방서: 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

- 도면종류

ㆍ부근안내도: 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

ㆍ배 치 도: 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치, 기타 시공에 필요한 사항

ㆍ대지 구적도

ㆍ건축면적 산출표

ㆍ내․외부 마감표: 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕 등

ㆍ각층 평면도: 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항

ㆍ입면도(정면 및 측면): 실시설계의 기준이 되는 사항

ㆍ단면도(종횡 2면 이상): 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

ㆍ각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

ㆍ주요 구조부 단면상세도

ㆍ기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토  목

- 설계 보고서ㆍ공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

ㆍ계획 및 방침: 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

ㆍ사전조사사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

※ 지반고는 반드시 측량을 실시하고 공사착공 시 인위적인 지반고 변경이 없음에도  도면과 상이시는 수급자 부담으로 재 측량하여야 함

ㆍ시공방법

ㆍ개략공사비 산정 및 기타 필요한 사항

- 구조 및 수리계산서

ㆍ구조계산서

ㆍ수리계산서

- 개략 설계내역서: 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

- 도면종류: 위치도, 종단면도 및 횡단면도, 평면도, 구조물도 및 부대시설도, 유역산출 면적표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조  경

- 설계 보고서

ㆍ공사개요: 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

ㆍ사전조사사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

ㆍ개략공사비 산정 및 기타 필요한 사항

- 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

- 도면종류

ㆍ위치도

ㆍ조경계획 평면도: 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ조경시설물 공사계획: 조형물, 파고라, 벤치, 음수대 등 조경시설물

4) 기계설비

- 설계 설명서

ㆍ설비 대략공사비, 수급자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

ㆍ시방서: 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주자의 지침을 받아 작성)

ㆍ설계 계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

- 도면종류

ㆍ범례 및 도면목록

ㆍ기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

ㆍ배치도: 상․하수도의 연결관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

ㆍ계통도: 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

ㆍ평면도: 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

ㆍ단면도: 설비 설치실의 층고를 확인할 수 있는 사항

ㆍ옥외 공동구: 관로 및 각종설비 평면도

ㆍ기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전  기

- 설계 설명서

ㆍ전기설비개요: 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

ㆍ수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명: 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

ㆍ본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

ㆍ에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

ㆍ인입방식 및 인입지점에 대한 설명

- 계산서

ㆍ각 실별 조도계산서

ㆍ부하산출서, 수배전 설비용량 계산서, 전압강하 계산

- 시방서

ㆍ자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 도면종류

ㆍ현장 안내도

ㆍ범례: 사용될 기호

ㆍ배치도: 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

ㆍ옥외간선도: 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도,  전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

ㆍ수변전 설비도: 각종 기기의 배치계획도

ㆍ각종 설비의 계통도: 전력, 방재, 기타 설비의 계통도

ㆍ각종 설비의 배치도: 전등, 전열, 동력, 방재설비 기타 설비 배치도

ㆍ기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신

- 설계 설명서

ㆍ통신설비개요: 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

ㆍ본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

ㆍ에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

ㆍ국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

- 계산서

ㆍ회선 용량계산서, 전계강도 계산서, 교환기 용량계산서

ㆍNVR 용량계산서

- 시방서

ㆍ자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 도면종류

ㆍ현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

ㆍ범례: 사용될 기호

ㆍ배치도: 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

ㆍ옥외간선도: 통신, 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

ㆍ통신장비 설치도: 각종 기기의 배치계획도

ㆍ각종 설비의 계통도: 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타 통신설비의 계통도

ㆍ각종 설비의 배치도: 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요설비의 배치도

ㆍ기타 중간설계의 기준이 되는 도면

7) 추정예상 공사비 작성

- 건축공사(가설공사, 토지 및 지정공사, 골조공사, 창호 유리공사, 수장공사, 마감공사, 조적공사, 방수공사, 조경공사, 기타 잡공사)

- 기계설비공사 / 전기공사 / 소방공사 / 통신공사 / 토목공사

※ 제경비 포함한 총 공사비 내역 작성

4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 계획설계 및 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 칫수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반 사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완설명서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

다. 설계도서의 구성

1) 건축

- 설계 설명서

ㆍ공사개요: 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

ㆍ설계개요: 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

ㆍ사전조사사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

ㆍ세부 시공방법

ㆍ공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

ㆍ건물의 색채사용계획

ㆍ공정계획(공정표 포함)

ㆍ기타 필요한 사항

- 구조 계획서

ㆍ설계근거기준

ㆍ구조재료의 성질 및 특성

ㆍ제반 하중조건에 대한 분석

ㆍ각부 구조계획

ㆍ구조성능: 단열, 내화, 차음, 진동 등

ㆍ구조계산서

- 시방서

ㆍ당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

ㆍ특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

- 도면종류

ㆍ부근안내도: 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

ㆍ투시도: 천연색채 사용

ㆍ도면 목록표

ㆍ배치도: 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

ㆍ부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

ㆍ구적도

ㆍ건축면적 산출표

ㆍ내․외부 마감표: 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

ㆍ각층 평면도, 단위 평면도

ㆍ각층 천장 평면도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ지붕 평면도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ입면도(4면): 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ주단면도: 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

ㆍ주단면상세도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ각실 단면상세도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ계단 평․단면상세도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

ㆍ각부 구조배근상세도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ옹벽배근도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ각부 구조단면도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ구조부재 접합상세도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ각층 기둥․보의 위치 및 일람표: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ부착시설물 상세도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ조경계획 평면도: 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ조경시설물 공사계획: 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판류 등

ㆍ건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

ㆍ기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척: 1/50 정도)를 작성하여야 한다.

- 공사비산출서: 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 토목

- 설계 보고서

ㆍ공사개요: 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

ㆍ계획 및 방침: 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

ㆍ사전조사사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

ㆍ세부시공계획/자재사용계획/세부공정계획

ㆍ세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

ㆍ구조 및 수리계산서

- 시방서

- 도면 종류

ㆍ위치도

ㆍ종단면도 및 횡단면도

ㆍ평면도

ㆍ구조물도, 부대시설도 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 공사비산출서: 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 조경

- 설계 보고서

ㆍ공사개요: 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

ㆍ사전조사사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

ㆍ세부시공계획/자재사용계획/세부공정계획

ㆍ세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

- 시방서

- 도면 종류

ㆍ배치도, 종단면도 및 횡단면도

ㆍ평면도

ㆍ조경시설물 배치도

ㆍ기타 시공에 필요한 사항 일체

- 공사비산출서: 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

3) 기계설비

- 설계설명서: 냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

- 시방서: 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 설계 계산서: 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 공조장비 선정서(습공기선도에 공기상태 표기), 필요시 견적서 등

- 도면종류

ㆍ건축 주요부분 평면도, 단면도

ㆍ범례

ㆍ도면목록표, 계통도

ㆍ기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

ㆍ배치도: 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

ㆍ계통도: 공조, 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

ㆍ평면도: 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

ㆍ단면도: 시공에 필요한 사항 일체(엘리베이터 건축단면도 포함)

ㆍ옥외 공동구: 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

ㆍ기타 필요한 도면

- 공사비산출서: 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

4) 전기

- 설계 설명서

ㆍ전기설비개요: 각 설비(전력, 통신, 소방, 약전, T.V.공청 기타 설비)에 대한 설명

ㆍ수변전설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명: 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

ㆍ본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

ㆍ에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점 설명

- 계산서

ㆍ각종 계산에 적용한 계산 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

ㆍ조도계산서, 부하계산서, 수배전설비용량 계산서

ㆍ전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서

ㆍ수변전장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블트레이 및 덕트 규격 계산서

- 시방서

ㆍ자재시방서: 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

ㆍ특기시방서: 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의 사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 도면종류

ㆍ도면목록표, 현장 안내도

ㆍ범례 특기사항: 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

ㆍ배치도: 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

ㆍ옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

ㆍ옥외간선도: 전력통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반 간선의 정격설치방범, 설치상세도 등

ㆍ수변전 설비도: 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

ㆍ각종 설비의 계통도, 배치도, 결선도 등 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ평면도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ단면도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ기타 필요한 도면

- 공사비 산출서: 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

5) 정보통신

- 설계 설명서

ㆍ통신설비개요: 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

ㆍ본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

ㆍ에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

ㆍ국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

- 계산서

ㆍ회선용량계산서, 전계강도계산서, 교환기용량계산서

ㆍNVR 용량계산서

- 시방서

ㆍ자재시방서: 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 도면종류

ㆍ현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

ㆍ범례: 사용될 기호

ㆍ배치도: 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

ㆍ옥외간선도: 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

ㆍ통신장비설치도: 각종 기기의 배치계획도

ㆍ각종 설비의 계통도: 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

ㆍ각종 설비의 배치도: 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

ㆍ시공에 필요한 사항 일체: 각종 설비의 계통도, 각종 설비의 배치도, 각종 설비의 결선도, 각종 기기의 상세도, 평면도, 단면도, 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

- 공사비 산출서: 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

제6장 설계 성과품의 제출

1. 계획설계 성과품 납품(설계공모안 보완내용으로 협의조정 가능)

<표3 - 계획설계 성과품>

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	4	부	(반접이)
2	현장조사보고서	A4	4	부
3	관련법규 검토서	A4	4	부
4	공사비 개산서	A4	4	부
5	착수보고 준비자료	A4	1	식	보고대상자 수 *2배수

※ 위 제출목록 전부를 USB 또는 CD로 제작하여 제출

2. 중간설계 성과품 납품

<표4 - 중간설계 성과품>

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종 분리 (반접이)
3	내 역 서 (관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방
6	지질조사보고서	A4	5	부		◯

※   건축도면 및 공종 포함 전체 본을 제본한다. (건축구조는 건축에 포함 제본)

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 제출목록 전부를 USB 또는 CD로 제작하여 제출

※ 계획 및 중간설계로 결정된 1개안은 별도 조감도 제작 제출

3. 실시설계 성과품 납품 및 제반사항

<표5 - 실시설계 성과품>

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	원도	A1	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	설계도면	A1	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이 현장비치용
		A3	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	계산서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	관급내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가조사표	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함 가격정보 2개
10	일위대가표	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	일반시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	특기시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	조감도 (*중간설계성과품)		3	부	◯							표구 포함 (0.6m*0.9m이상)
15	공정표	A2	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 통합 현장비치용
		A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	건축설계도면 겉지안에 합권
16	전자파일 (CD 또는 USB메모리)		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
17	각종 예비인증서				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	인증기관통보용
18	기타 발주자 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	기계,전기․통신 관급도면(A3반접): 3부 추가

※ 조감도는 제출 시 별도로 각 커트 당 A4 규격 3매와 원본 파일을 포함한다.

※ 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주 시 별도 제작 제출

※ 위 제출목록 전부를 CD 또는 USB 메모리에 저장 제출

※ 신재생에너지 중 태양광․태양열, 지열 과업부분의 성과물 (도면, 내역서, 시방서 등)은 별도로 제본하여 제출할 것. 수량은 상기 기준표 참조

1) 종결보고서

○ 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

○ 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

○ 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

○ 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 3부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

○ 조감도(A1 이상, 표구 포함) 3부 및 주요공간(로비 등) 실내투시도 3컷 내외

○ 기타 발주자가 요구하는 성과품

2) 설계설명서

○ 환경 및 대지조건, 지질 지형 및 하부구조, 배치계획, 예상 공사비 타당성 검토, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면, 입면, 주요 단면 선정, 구조, 설비, 부대시설 등 기본 방식 결정, 설비 계통도 등 설계의 내용을 쉽게 파악 가능토록 작성

3) 계산서

○ 구조 계산서, 전력 부하 계산서, 조도 계산서, 냉난방 계산서, 기계 설비용량 계산서, 정화조 등

○ 구조계산서 작성에 관한 사항은 “건축물 구조계산서 작성 및 검토요령”에 의거 작성하여야 한다.

4) 납품 실시설계도면 작성에 관한 사항

○ 설계도면은 도면 둘레의 훼손을 방지할 수 있고, 보관이 용이하도록 제출

○ 도면의 내용에 있어 다음 사항을 상세히 명기하여 시공 및 적산에 용이하도록 작성

- 각부 치수의 정확한 표기(치수는 미터법 사용)

- 각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명기

- 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

- 각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명기

- 각종 부착물 및 부품에 대한 명기

- 특수공법에 대한 공인기관의 기술검토보고서 첨부, 설명서(상세도) 작성

- 도면 이해를 위한 주기 사항 및 시공 시 유의사항을 명시

- 부호, 방향 KEY PLAN, GRAPHIC SCALE, ROOM NAME등

- 계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

- 계통설명도

- 수량집계표

- 기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

○ 도면 표기 방법: 건축, 토목, 기계, 전기 등 관련 법규 및 제반 규정을 준수하여 표기

○ 설계도면에는 도면 하단에 전문 분야별로 참여한 책임 또는 참여기술자의 확인 및 서명 날인을 하여야 함.

○ 설계도서 검토 도면 제출

① 검토방법: 설계시행 책임기술자가 검토

- 먼저 각종계산서 확인 및 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

※ 도면 우측에 관련 구조계산서 등을 부착하고 종평면상 구조물의 위치 및 치수 등과 사용재료, 철근 규격, 수량 등을 형광펜으로 칠하면서 확인

∙일치하는 경우 – 연두색   ∙재검토 필요시 - 청색

∙틀린 경우 – 빨간색       ∙수정 완료시 - 연두색

∙수급자가 재검토 후 모두 녹색으로 표시된 경우 완료된 것으로 함

② 제출도면: 검토 및 수정 완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토 도면 1부 제출

5) 시방서 작성에 관한 사항

○ 시방서는 설계도면에 표기하기 어려운 시공방법, 품질기준 등을 명기

○ 시방서는 일반시방서, 특기시방서, 자재시방서로 구분하여 작성하되 합권하여 작성

○ 시방서는 건설부 제정 표준시방서 및 관련기준에 적합토록 작성

○ 일반시방서에는 설계개요, 인허가사항, 일반 시공방법에 대하여 기술

○ 특기시방서에는 일반시방서에 포함되지 않은 다음 사항을 포함 작성

- 레미콘 구입 시 규정상 슬럼프 허용오차를 고려하여 현장타설시 소정의 슬럼프치가 확보될 수 있도록 특별시방서에 명기할 것

- 각종 자재 및 부품의 시공방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항

- 각종 구조공법과 이에 따른 부수시설 및 장비 사용에 관한 사항

- 관련 공사간의 시공 책임한계 명시

- 가 시설물의 설치에 관한 사항(가건물, 비계, 흙막이, 형틀 등)

- 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

○ 자재시방서에는 사용 재료의 품질, 규격등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항을 충분히 검토하여 작성하여야 함

○ 특수공법 및 특수자재로서 국내 관련 규정이 없을 때에는 그 품질, 규격 및 시공 방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련 사항을 충분히 검토 작성하여야 함

○ 사용 자재에 있어서는 제조 회사의 고유 제품명을 표시할 수 없으며, 학술적 명칭을 사용하여야 함

○ 도면 및 시방서에 콘크리트의 품질(강도, 슬럼프치, 설계방법, 시공순서, 콘크리트 타설 순서, 균열 방지대책, 양생 방법 등)에 대해 명기할 것

6) 예산 내역서

○ 예산내역서의 작성은 정부 제정 관련 공사 표준품셈을 적용하여야 함

○ 공사비 내역서는 재정경제원 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준을 적용한다

○ 재료비

- 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재가격)으로 한다.

- 조달 정보지에 미수록된 자재는 재정경제원에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용한다.

- 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2이상의 사업자에 대하여 당해물품의 거래가격을 현장조사 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

○ 직접노무비: 조달청, 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

○ 공사비에는 지장물이설비, 한전인입비, 상수도인입비, 도시가스인입비, 시운전비(전기, 기계)등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

○ 내역서 비고란에 일위대가표의 해당 코드번호를 필히 기록하고 일위대가 없는 자재의 경우 단가 산출조서 근거를 기록할 것

○ 표준품셈에 명시되지 아니한 특수 사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술 수준과 여건이 감안되어야 함

○ 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 함

○ 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

○ 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

○ 운반비는 운반 장비, 운반 거리, 도로 상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출 내역을 첨부

○ 수량의 산출은 건설부 발행 적산 요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계한다.

- 작성방법 관련 규정: 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령, 동법 시행규칙, 예산회계법 및 동법 시행령, 재무회계 예규, 기타 관련법규 및 기준

○ 시공상세도면(SHOP DRAWING) 작성에 대하여 공사비 내역에 반영

- 건설기술진흥법 제23조의 2 및 동규칙 제14조의 4의 규정에 의한 공사중 시공자가 작성해야될 시공상세도면(SHOP DRAWING)을 작성하는데 필요한 인건비, 소모품비 등의 물량을 산출하고, 공사비 내역에 반영시켜야 하고, 공사진행 단계별로 작성할 시공상세 도면의 목록을 특별시방서에 명시하여야 한다.

7) 예정공정표 작성

○ 예정공정표는 반드시 CPM/NETWORK 기법으로 설계원도 및 청사진에 작성하고, A2 규격으로 제출한다.

○ 공사기간 산정 시 태풍, 혹서, 혹한 등으로 인한 작업 불능일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여 하여야 한다.

8) 관련법규 및 제반 규정 준수

○ 건축법 및 건축사법

○ 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙

○ 극한강도설계법에 의한 철근 콘크리트 구조 기준

○ 건설기술관리법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 산업안전보건법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 소방법 관련 규정 및 기준

○ 산업표준화법 관련 규정 및 기준

○ 전기사업법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 전기공사업법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 한전 공급 규정

○ 전기용품 안전관리법, 동시행령

○ 폐기물관리법 관련 규정 및 기준

○ 대기환경보존법 및 수질환경보존법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 전기통신법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 전기통신공사업법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 전파관리법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 에너지이용 합리화법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 수도법 및 하수도법, 동시행령 및 동시행규칙

○ 주차장법 관련규정 및 기준

○ 국토부 건축공사 표준시방서

○ 국토부 건축설비공사 표준시방서

○ 국토부 토목관련공사 표준시방서 및 설계시공 지침

○ 국토부 조경공사 표준시방서

○ 국토부 건축표준상세도

○ 고압가스 안전관리법 및 도시가스업법 관련법규 및 기준

○ 기타 정부 관련 법규 및 지방자치단체 조례방침 등

9) 유지관리 지침서 작성

○ 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리 지침서를 각 분야별로 상세하게 작성하여야 한다.

○ 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

[붙임 1]   보안각서

[붙임 2]   설계검사원

[붙임 3]   주간공정보고

[붙임 4]   월간공정보고

[붙임 5]   협력기술자 보고

[붙임 6]   설계도서 작성 시 유의사항(건축).  끝.

[붙임 1] 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명:                     공사 설계용역

2. 계약  일자: 2025.   .   .

3. 착수  일자: 2025.   .   .

4. 완수예정일: 2025.   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약 일반조건 제9절(기술지식의 이용과 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2025.    .     .

주        소 :

주민등록번호 :

대   표   자 :                         (인)

문경시장 귀하

[붙임 2] 설계검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명:                     설계용역

2. 계약금액: ₩         원(금          원)

3. 계약일자: 2025.   .   .

4. 착수일자: 2025.   .   .

5. 완수예정일: 2025.   .   .

붙임  납품설계도서 목록  1부.

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2025.   .   .

수   급  자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                        (인)

문경시장 귀하

[붙임 3] 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                      공사 설계용역

□ 용역개요

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 계약금액 :         원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(20 . . .)			금주예정사항(20 . . .)			비고
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기
공정률	계획	실적	대비	계획	실적	대비

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :                                (인)

문경시장 귀하

[붙임 4] 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                      공사 설계용역

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . ～ 20 . . )	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익월	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :                                (인)

문경시장 귀하

[붙임 5] 협력기술자 보고

관계전문기술 협력기술자 명단

ㅇ 용 역 명 :

ㅇ 용역기간 :

ㅇ 용역회사 :

ㅇ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자 (설계사,감리사)					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격증번호

설계용역자문 참여기술자 명단

(회사대표, 책임․분야별․참여기술자 등)

구 분	분 야 별		성 명	서 명
설계사 (기술사)	회사명	ㅇㅇ건축사사무소 ㅇㅇ엔지니어링
	참여기술자	사업책임기술자 분야별책임기술자

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :                            (인)

문경시장 귀하

[붙임 6] 설계도서 작성시 유의사항(건축)

설계도서 작성 시 유의사항(건축)

1. 도면, 시방서(일반시방서 및 특기시방서) 및 내역서 즉, 설계도서 상호간 자재, 규격, 공법 등을 필히 일치할 것

2. 내역서의 품명 또는 규격란에 재료명, 시공방법 등 명확히 표기

〔예 : 액체방수 1종, 조합페인트 1급 2회, 일반유리, 복층유리, 강화유리, 가설전력 사용량(㎾) 등〕

※ 불가피하게 수량을 1식으로 표기 시 특기시방서상 준공 시 정산조건임을 명시

3. 중기 경비 산출 단가산출서 첨부 및 내역서의 품명 또는 규격란에 중기종류, 공법, 조건(운반거리, 사토장의 지번까지 명기) 등을 명확히 표기

4. 목공사, 금속공사, 내장공사, 인테리어 등의 모든 품목은 일위대가표 작성이 원칙

5. 내역서 작성 시 전문 업체 견적가격을 적용한 품목은 해당 견적서 첨부(복수견적)

6. 내역서는 물품목록코드에 의한 시설공사 자재코드 및 일위대가코드(텍스트파일 호환 가능 프로그램으로 코드는 11자리)로 작성하고 새로운 자재 및 일위대가는 기존 일위대가를 변경하여 작성하지 말고 신규코드로 작성

※ 기존 일위대가를 변형․변경하여 적용 시 오류 발생이 많음

※ 변형 11코드 사용 시 추후 재작성 하여야 함

7. 창호공사는 Type별 개소 당 내역서 및 일위대가표로 작성하고 일위대가 세부내역은 다음과 같이 산출

가. Al.창호 : Fix, SL, PJ, 커튼월 등으로 구분하여 창호철물 및 부자재가 제외된 순(純) 알미늄바 만의 정미중량(kg)으로 산출하여 내역서의 규격란 에 명기하고 마감을 명시할 것(예: 불소2회)

나 커튼월 창호는 커튼월을 명시해주고 단열바 창호는 단열바를 M로 산출하여 단가 적용할 것

다. 철재 도어 및 셔터 : 프레임 규격, 마감 등을 표기 후 면적(㎡) 단가 적용

(예 : 150×45×1.6ⓣ, 분체도장, 1.89㎡)

라. 스테인리스 창호 : 부재의 규격, 마감별로 구분하여 길이(m) 단가 적용

(예 : 100×40×1.2ⓣ, 헤어라인마감, 5.2m)

※창호철물(정첩, 도어록, 플로어힌지 등)과 코킹은 별도내역으로 작성

8. 사후 정산공종이 있을 경우 특기시방서에 품명, 범위, 수량, 해당금액 및 정산 방법 등을 표기하고 현장설명 시 배포하는 현장설명서에도 표기

9. 관급자재는 도급자 설치 관급액과 관급자 설치 관급액으로 구분 표기(산업안전보건관리비 산정 시 도급자 설치 관급액만 반영)

10. 폐기물은 품명, 규격란에 폐기물 종류(내장재, 구조물 철거재, 혼합폐기물) 및 처리방법 (매립 또는 재활용처리)을 표기하고, 100톤 이상 시는 별도발주 내역작성

11. 원가계산 시 환경보전비, 건설하도급 대금지급보증서 발급수수료, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 추가 계상

12. 국토교통부 실적공사비 및 조달청 시장시공가격을 우선 적용하여 내역서를 작성할 것

13. 조달청 원가계산 제비율을 참고하여 원가계산 할 것

14. 특정자재사용은 가급적 지양할 것

15. 주요자재(시멘트, 모래, 자갈, 잡석)는 별도공종으로 취합 반영함

16. 원가계산은 아래와 같이 할 것(공사발주별)

① 건축(건축+토목+조경+기계설비)은 건축 원가제비율 적용 요

② 전기는 전기 원가제비율 적용

③ 통신은 통신 원가제비율 적용

④ 소방은 소방 원가제비율 적용.

⑤ 기타(폐기물처리비)등은 기타 원가계산제비율 적용

17. 공사비분석표를 작성할 것.  끝.