봉계초등학교 다목적강당 증축공사 설계용역

과업지시서

2025.  4.   .

경상북도김천교육지원청

Gyeongsangbuk-do Gimcheon Office of Education

목    차

Ⅰ. 설계개요	3

Ⅱ. 일반사항	7

Ⅲ. 공통설계 지침	11

Ⅳ. 계획설계 지침	16

Ⅴ. 중간설계 지침	20

Ⅵ. 실시설계 지침	22

Ⅶ. 건축공사 설계지침	25

Ⅷ. 토목공사 설계지침	28

Ⅸ. 조경공사 설계지침	30

Ⅹ. 지질조사 지침	32

Ⅺ. 설계도서 작성 및 납품	34

【붙임 1】 실별 소요면적(SPACE PROGRAM)

【붙임 2】 부지 현황

【붙임 3】 주간 공정보고

【붙임 4】 월간 공정보고

1

설 계 개 요

1. 용역명: 봉계초등학교 다목적강당 증축공사 설계용역

2. 목적

가. 미래형 교육과정 운영을 위한 새로운 다목적강당 모델 제시

나. 교육정책 및 목표, 미래학교 방향 등에 따른 실천 과제를 담은 공간계획

3. 사업개요

가. 대지 위치: 경상북도 김천시 봉산면 봉계길 74-15

나. 대지 면적: 20,644.1㎡

다. 사업 규모

1) 다목적강당 증축 추정 연면적: 591.26㎡

2) 주용도 : 교육연구시설(초등학교)

3) 학급 및 학생수: 8학급 77명(특수 2학급 10명 포함)

4) 실별 소요면적: [붙임 1] 참조

라. 예산 규모

-총 공사비: 금2,003,882천원(부가세포함) - 건축, 토목, 조경

※ 사업규모 및 예산액 범위 내 설계하는 것을 원칙으로 하되, 설계면적은 ±3% 범위 내에서 조정할 수 있다.

※ 기계설비, 전기, 정보통신, 소방 제외

※ 본 설계용역건에 수반되는 각종 인증수수료에 대하여는 발주청에서 별도 지급

※ 각종 행정절차에 따른 예비인증 및 인허가, 설계안전보건대장 작성 및 설계안정성검토 등 일체의 비용을 포함

4 과업범위

가. 일반 사항

1) 본 용역 계약 상대자는 사전기획용역 보고서 (단, 스페이스 프로그램은 수정될 수 있음)를 활용 검토하여 제시된 사용자 의견을 적극 반영하여야 한다.

2) 본 용역 계약상대자는 계획설계, 중간설계 및 실시설계를 수행하여야 하며, 설계범위는 건축, 토목, 조경 분야를 포함한다.

3) 본 공사 준공 이후 건축행정시스템(세움터) 건축물관리대장 등재 업무를 수행하여야 한다.

4) 에너지효율등급 예비인증: 에너지 절약계획서 제출 대상으로 공공건물 74점 이상 득할 수 있도록 설계하여야 하며, 에너지효율등급(1++등급 이상) 예비인증을 득하여야 한다.

5)  제로에너지건축물 (5등급이상) 인증을 득하여야 한다.

6) 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 예비인증: 장애물 없는 생활환경 예비인증을 득하여야 한다 (BF 예비인증 수수료는 사후 발주기관에서 지급 예정).

7) 안전관리계획(높이 5m이상인 거푸집 및 내부동바리, 천공기, 항타기 등) 수립이 예정되어 설계 안전성 검토가 필요할 경우 설계안전성검토를 실시하여 결과보고서를 제출하여야 한다.

8) 지반 지질조사: 대지의 현황 및 지반조사(3개소, NX-1공, BX-2공, DHT 1회)를 실시하여 설계에 반영하고, 조사를 위한 장비 진입 및 제반 인·허가 등은 계약상대자 책임 하에 이행하여야 하며, 이에 따른 민원이 발생하지 않도록 처리하여야 한다.

9) 경상북도교육청의 중간설계 심의협의회 및 사용자 측(교사, 학생, 학부모, 지역민) 설계 설명회 등 모든 협의회의 관련 서류 작성과 브리핑을 수행하고, 심의(협의)된 결과를 정리하여 본 설계에 적극 반영하여야 한다.

10) 적절한 설계와 효과적 사용을 통해 범죄유발 요인을 근본적으로 제거하는 셉테드(CPTED) 기법을 설계에 반영하여야 한다.

11) 건축 인허가, 설계협의회, 학교환경디자인팀 자문, 공사발주를 위한 관련 자료제출 등에 적극 협조하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 우리 청의 요구사항을 반영하여야 한다.

12) 각종 행정절차에 따른 예비인증 및 인허가 규정을 준수하고 득하여야 한다.

13) 설계안전보건대장을 작성하여 제출하여야 한다.

14) 우리 청에서 추진하는 감성적인 학교 공간 조성계획이 잘 반영될 수 있도록 협조하고 아이디어를 제공하여야 한다.

나. 계획 개요

1) 「경상북도교육청 학교시설·설비기준」 및 공모지침서 상의 스페이스프로그램에 따라 적정 면적으로 계획하며, 이용에 지장이 없도록 적정한 규모와 형태를 결정한다.

2) 설계도서 작성기준은 『공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [국토교통부고시 제2020-635호 (2020.09.14.)』, 『설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 검토에 관한 지침[국토교통부고시 제2021-981호(2021.7.23.)]』 제3장 기본설계등 시행에 관한 사항을 적용

3) 지질조사를 실시(NX 1공, BX 2공, DHT 1회)하여 적정한 지내력 판단 후 기초 및 건물구조의 정확한 시공방법을 결정한다.

4) 「KDS 41 17 00 : 건축물 내진설계기준」에 적정하게 구조체 및 외장재에 대한 구조 설계를 하도록 한다

5) 기타 관련법에 적합하고 용역 목적에 부합될 수 있는 건물로 계획한다.

다. 용역 기간

본 설계용역 기간은 착수일로부터 130일 이내로 한다.

(계획설계 15일, 중간설계 20일, 실시설계 75일, 설계협의 및 일상감사 20일)

☞ 본 설계용역 기간 중 설계협의 및 일상감사에 소요되는 20일에는 각종 설계협의회(설명회), 중간설계 심의 협의회 등을 포함한다.

라. 설계 방향

1) 본 사업은 교육 기반을 조성하고 변화하는 교육에 대비할 수 있는 학교시설로 계획한다.

2) 본 사업은 “봉산면”이라는 지역 맥락에 부합하는 형태 및 입면을 구성하여, 지역사회의 문화적 중심체로서의 역할을 분담할 수 있는 효율적이고 합리적인 기능의 배치와 창의력 넘치는 건물을 조성한다.

3) 공공건축 사업계획 사전검토 의견사항을 최대한 설계에 반영하여야 한다.

4) 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작 설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

5) 학생들의 기호와 정서, 지적 창의성 발달 등에 도움이 될 수 있도록 구조물의 매스(Mass), 배치, 입면, 평면 형태 및 색상 등을 계획하여야 한다.

6) 주변 환경과 조화를 이루며 면학분위기를 제고할 수 있도록 녹지, 조경, 담장, 옹벽 및 휀스 등 옥외구조물을 계획하여야 한다.

7) 미래지향적이고 향후 교육여건 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 학습공간으로 설계하여야 한다.

8) 학교시설 설계·안전매뉴얼을 참고하여 학교 구성원이 안전하고 편리하게 사용할 수 있는 여유로운 공간으로 설계하여야 한다.

9) 지구환경문제와 새집증후군 등에 능동적으로 대처하고 예방할 수 있는 환경 친화적인 학교시설로 설계하여야 한다.(건축물의 장수명화, 친환경자재, 신·재생에너지, 고효율기자재 사용, 생태 면적률 적용 등)

10) 학생 및 교직원을 비롯하여 학교시설을 이용하는 모든 사람들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 시설로 설계하여야 한다.(엘리베이터, 옥외경사로, 난간, 장애인편의시설 및 기타 관계법령에 따라 설계반영)

11) 지진 및 각종 풍수해에 대비하여 관계 법령에 적합하게 설계하여야 한다.

12) 학교시설에 필요한 기능 확보를 위한 세부 설계계획 사항은 다음 참고자료를 활용하여 계획한다.

구 분

참고자료

참고자료 기관

설계메뉴얼

경상북도교육청 학교시설·설비기준

미래형 학교시설·설비기준

경상북도교육청

설계메뉴얼

실내건축의 구조 · 시공방법 등에 관한 기준

국토교통부 고시

설계메뉴얼

범죄예방 건축기준

국토교통부 고시

설계메뉴얼

학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행령-[별표1]

교육부

설계매뉴얼

장애물 없는 생활환경인증제도

한국장애인개발원

사전기획용역보고서

봉계초등학교 다목적강당 증축공사 사전기획용역 보고서

시설거점지원센터

2

일 반 사 항

1. 일반사항

가. 본 용역은 국토교통부 고시 제2020-635(2020.9.14.)호의 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」에 의한 [별표 2] 건축설계에서의 도서작성 기준에 의거 추진단계별(계획·중간·실시설계) 중급 이상의 설계 도서를 작성하여야 한다.

나. 본 설계는 국토교통부 제정 각종 공사시방서, 건설공사 표준품셈과 본 설계지침에 의거 작성하여야 한다.

다. 모든 자재는 KS 제품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없는 자재는 국산 최우량품 또는 녹색제품을 사용하여야 한다.

라. 용역수행내용

1) 현황 및 지반조사

- 시추조사(Boring Test)

- 표준관입시험(S.P.T)

- 지하수위 측정

- 전단파시험(D.H.T)

2) 계획 설계도서 작성 및 브리핑(각종 협의회 포함)

3) 중간 설계도서 작성 및 브리핑(각종 협의회 포함)

4) 실시 설계도서 작성

5) 조감도 작성

6) 주요자재 선정 검토서 작성

7) 색채계획서 작성

8) 기타 계약서 또는 과업지침서에 정하는 사항

2. 행정사항

가. 착수계 제출 시 다음의 제반 서류를 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 사업 책임기술자 선임계

- 재직증명서, 이력서, 기술자 면허수첩 사본, 경력증명서 첨부

3) 설계 예정공정표

- 분야별 세부공정 계획서 및 업무흐름도 포함

4) 분야별 참여기술자 명단

- 재직증명서, 이력서, 기술자면허수첩 사본, 경력증명서 첨부

5) 보안각서

6) 과업수행계획서

- 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

- 분야별(건축, 구조, 토목, 조경, 색채 등) 업무범위와 책임한계

- 설계품질 보증계획

- 각 분야별 인력투입계획

- 분야별 세부 과업수행 절차

- 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

나. 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 착수계 제출 후 우리 청과 협의하여 정기적인 업무협의회(월 2회 이상)를 실시하며, 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 하여야 한다.

가) 조사 및 자료 수집의 완료 또는 공법 결정 시

나) 계획설계 및 중간설계 완료 전

다) 실시설계 완료 전(유지관리 계획을 포함)

라) 각종 협의 및 설계심의 자료 작성 완료 시

2) 계약상대자는 매주 공정보고 및 매월 공정보고를 우리 청 담당자에게 제출하여야 한다.

가) 주간 공정보고【붙임 3】: 매주 수요일

나) 월간 공정보고【붙임 4】: 매월 마지막 주 수요일

☞ 제출방법: 우리 청 담당자 이메일로 제출

3) 설계 설명·협의회의 내용 반영 등 주요한 업무는 사전 승인을 받도록 하며, 과업수행은 예정공정표에 따라 성실히 수행하여야 한다.

다. 관련기관 인·허가 및 협조

1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축허가에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업부지 내·외 지하지장물의 매설여부(상·하수도관, 기타)를 계약상대자 책임 하에 조사하고, 관련기관과 협의한 후 설계에 반영하되, 협의 결과를 우리 청에 보고하여야 한다.

3) 계약상대자는 본 과업의 인·허가 사항에 대하여 우리 청과 협의하여 가능한 용역기한 내에 건축승인 등 모든 행정절차를 완료할 수 있도록 노력하여야 한다.

라. 하도급의 범위

1) 계약상대자는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 시험, 지반조사, 측량 등 이와 유사한 작업

나) 계획설계 연구와 관련된 업무

다) 적산 및 견적업무, 구조계산 설계업무

라) 기타 발주청이 인정하는 업무

3) 하도급은 관계법령에 의거 적격자에게 하도급 하여야 하며, 「건설기술진흥법」 제35조제4항 및 같은 법 시행규칙 제31조의 1항에 의거 설계용역의 하도급을 체결하였을 경우 하도급 기술참여자 명부를 작성하여 즉시 우리 청에 통보하여야 한다. 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 져야한다.

마. 타 계약상대자와의 업무한계

다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 기간 내의 과업을 수행하여 서로간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 대표자 책임 하에 계약상대자간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

바. 과업의 변경 등

본 과업수행 중 우리 청의 사업계획 변경 등에 따라 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정·변경할 수 있다.

3. 유의사항

가. 계약상대자는 우리 청에서 제시하는 기본사항(제원, 위치, 계획, 개요 등)과 설계 유의사항을 충분히 숙지한 후 관련 자료를 수집하여 본 과업의 성과가 설계에 집약될 수 있도록 하여야 한다.

나. 계약상대자는 각 분야별 설계에 있어서 특수성 및 중요성이 요구되는 것은 그 원인을 분석하여 담당자와 협의 후 경제적이고 합리적인 안을 채택하여 설계하여야 한다.

다. 계약상대자는 계약서에 의거 기한 내 착수계 등 제반 서류를 제출하고 진행사항을 수시로 담당자에게 통보하여야 한다.

라. 계약상대자는 설계를 수행함에 있어 완료되거나 수정 설계 시에는 기계, 전기 용역 계약상대자 등과 수시로 협의하여야 한다.

마. 설계심의 및 보완 등

1) 계약상대자는 각종 설계와 관련된 설계심의회 및 설명회(협의회)에 참석하여 설명은 물론 심의자료를 작성하고, 보완요구 사항이 있는 경우는 즉시 보완조치 하여야 한다.

2) 제출된 설계도서는 우리 청이 관계 기관과의 협의를 거쳐 확정될 때까지의 지적사항과 공사시행 과정에서 설계변경(설계서의 내용이 공사현장과 상이, 누락·오류 또는 상호 모순 등) 상황이 발생되는 경우와 우리 청의 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 즉시 수정·보완하여야 한다.

바. 설계도서의 저작권

본 설계 건에 대하여는 계약상대자의 설계도서 납품 후 우리 청의 시설사업 추진이 목적이므로, 용역 납품 후 설계도서의 저작권은 우리 청에 귀속 된다.

사. 책임 및 하자보증

1) 계약상대자는 일체의 제출도서에 대하여 책임을 져야 하고, 시공 도중 설계도서가 상호 부합되지 않을 경우 현지조사 및 시험 등의 요구가 있을 시 즉시 응하여야 하며, 이에 따른 발생 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

2) 용역납품 검수 후라도 설계상의 결함 또는 변경 사항은 반드시 수정요구에 응하여 보완 제출하여야 한다.

3) 제출된 설계도서에 대한 하자(공사시공 및 준공 후 설계구조의 불안전으로 발생하는 하자와 설계 후 공사물량의 착오로 인하여 손해가 있을 시 등)는 계약상대자로서의 성실의무와 필요한 조치를 이행하지 않으므로 인해 발생되는 상황이므로 이에 대한 모든 민·형사상의 책임을 져야한다.

아. 계약의 해제

용역계약 체결 후 과업 진행 중 다음 경우에는 우리 청이 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며, 계약상대자는 이의를 제기할 수 없다.

1) 계약서상의 설계도서 작성지침 및 계약 후 우리 청의 정당한 지시사항을 고의 또는 임의로 불이행 했을 경우

2) 계약상대자 개인의 특수사정, 무성의, 불성실 등으로 지정기일 내에 도저히 납품 가능성이 없다고 예상될 경우

3) 계약상대자의 고의 또는 부주의로 외부에 과업 내용을 공개하여 우리 청의 사업 추진상의 물의를 야기시켰을 경우

자. 우리 청의 사정으로 건축승인이 지연될 경우 별도 협의에 의하여 추후 건축 승인을 완료하여야 한다.

3

공 통 설 계 지 침

1. 일반사항

가. 부지 내의 모든 시설에 관한 계획은 종합계획을 수립한 후 이에 따라 세부 실시계획이 작성되어야 한다.

나. 각 시설의 설계는 안전성, 경제성, 시공의 난이도 및 기능에서의 합리성이 검토되어야 하며, 가능한 조형미의 구현을 위한 노력이 집중되어야 한다.

다. 공사 집행계획에 소요되는 자재, 장비 및 노무 수급 등의 계획이 동시에 검토  되어야 하며, 합리적이고 구체적인 계획이 되도록 하여야 한다.

라. 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 합치되어야 하고 해석이 용이하도록 작성하여야 한다.(설계도서, 공사시방서, 각종 계산서 등)

마. 예정공정표는 PERT 또는 CPM 기법으로 작성하고, A3규격으로 제출하여야 한다.

바. 예정공정표 작성 시 공공건설공사의 공사기간 산정기준 (국토교통부고시 제2021-1080호) 제4조 1항에 의거 작성 및 제출하여야 한다.

2. 사전조사에 관한 사항

가. 정확한 기반조사

1) 부지입지 조건 및 지형조사

2) 지질·지반조사

나. 기상조건 조사

1) 일조 및 기온·습도

2) 풍향 및 풍속

3) 강우 및 강설량

다. 교통관계

1) 도로 및 교통량

2) 주차장

3) 중량적 운반수단 검토

라. 지하매설물 및 배수 계통의 조사

1) 지하매설물 유무 조사

2) 배수 및 오물처리 계통(해당 지역의 상·하수 시설 기본계획 포함)

마. 지역조건에 관한 조사

1) 지역의 위치, 형태 및 범위

2) 인근 시설물

3) 대지 내 기존 시설(장애물)의 유무

4) 토지이용계획에 관한 사항(도시계획상 용도지역 관계)

3. 건축물의 조형미 구현에 관한 사항

가. 건축물은 기능을 우선적으로 고려하되 미적으로 양호하여야 하며, 품질 확보를 위한 견실 설계로 부실공사를 예방할 수 있도록 최선의 노력이 집중되어야 한다.

나. 입면계획의 조형미

1) 균형과 통일성

2) 변화 있는 계획

다. 특수성을 살린 건축 계획

1) 기능에 따른 특징

2) 상징적 표현(Land Mark)

라. 마감 재료의 적정한 선택

1) 색채의 조화

2) 질감의 적정

3) 내구성이 있는 재료 선택

마. 주변 환경 여건과의 조화

1) 건축 계획의 조화성

2) 조경 계획의 적정화

4. 정지, 시설배치 및 조경계획 등에 관한 사항

가. 자연여건을 최대한 이용한 계획수립

1) 불필요한 절·성토의 지양

2) 옹벽 등 불필요한 구조물 설치의 억제

3) 수목, 암석 등 기존 조경재의 활용

나. 건물 및 주변 환경조건과 조화되는 조경계획 수립

1) 소재 선정 상 타당성 여부

2) 식재 밀도

3) 계절적 감각 검토

4) 토질 및 기후의 적용선 검토

다. 부지 내 각 시설의 합리적인 배치

1) 시설의 활용에 편리한 배치 계획

2) 일조 등을 고려하여 배치하고 건물 간 적정거리확보

3) 방화, 피난 등을 위한 공간 확보

5. 건물 계획에 관한 사항

가. 사용에 적정한 규모의 실 규격(모듈) 판단

1) 수용인원 판단

2) 수용장비의 크기, 용량, 대수판단

나. 사용 편리를 위한 건물 각부 치수결정(인체 및 사용기기, 설비 치수에 부합)

1) 출입구 크기의 적정화

2) 천장높이 및 창문높이 검토

3) 부대시설 크기 및 설치위치 검토(부속실, 기자재, 국기게양대 등)

4) 각부 치수의 표준화, 자재의 규격화

다. 이용에 합리적인 시설배치(각 실, 기자재 등)

1) 가급적 동선의 단축

2) 사용자가 편리한 동선 계획

3) 요구 기능에 따른 동선의 분리

4) 상·하층을 연결하는 수직 동선의 검토

라. 사용자가 편리하게 이용할 수 있는 후생시설 확보

1) 실내·외 휴게 공간 배려

2) 부지 주변의 휴게 공간 연계

마. 건물용도 및 규모에 적정한 내․외장 재료의 선택

1) 재료의 내구성(강도 등) 검토

2) 재료의 색상, 질감 및 사양 검토

3) 재료의 경제성 검토

바. 비상 시 대피시설의 확보

1) 피난시설(피난계단, 통로, 지하실, 비상구 및 옥외 공간)

2) 방화상 필요한 구조 및 재료의 선택

3) 오물 방지시설 계획 검토

사. 건물외관 계획에 관한 사항 검토

1) 건물 기능에 적합한 외관의 선택

2) 주변 환경과 조화되는 계획

3) 가급적 조형미의 구현

아. 사용에 적합한 통로시설 확보

1) 계단(계단의 위치, 폭, 단 너비 및 높이)

2) 복도 및 통로(복도 폭과 보행거리 검토)

자. 에너지 절약을 위한 건축 계획

1) 단열효과의 제고를 위하여 외벽, 바닥 및 천장의 구조 및 재료 검토

2) 가능한 자연채광과 환기를 고려한 적정면적의 창문설치

차. 창호설치 계획의 적정화

1) 실 기능에 맞는 창호재의 결정

2) 채광 및 환기를 위한 개구부 면적의 확보

3) 창호의 개폐방식, 방향, 크기의 적정화

4) 적정한 종류 및 크기, 창호 부속철물의 설치

5) 창호용 재료의 규격품 사용 명시

6) 창호의 개폐 시 밀폐될 수 있도록 정밀 설계

7) 창호의 재질은 단열, 결로 등을 방지 할 수 있는 기능성 창호로 설계한다.

6. 누수 및 결로 방지 대책에 관한 사항

가. 지하수압 적용에 관한 사항

1) 지하수 및 수압검토

2) 방수재료 및 공법의 적정성 검토

3) 지하수위를 낮추는 방안

4) 방수층을 통과하는 각종 배관주위 방수대책 강구

나. 우수 및 침수에 따른 대책

1) 지붕 및 외벽 부분에 대한 우수, 침수 대책검토(방수재료 및 공법선택)

2) 개구부 주위 누수방지 대책

3) 돌출부분 등 물끊기 처리

4) 화장실, 욕실 등 물 사용 실에 대한 방수대책

다. 결로 방지를 위한 검토

1) 외벽의 실내에 면한 부분의 구조 검토(노점온도 이상이 되도록 처리)

2) 열교현상 방지대책

7. 건축구조의 안전성에 관한 사항

가. 지반 상황에 적합한 기초구조 선택

1) 적정한 지내력의 판단

2) 기초의 구조 및 시공방법 결정

3) Pile의 종류, 규격, 품질, 소요수량 검토

나. 구조물에 작용하는 하중의 적정한 판정

1) 고정하중

2) 활하중

3) 풍압 및 적설하중

4) 수압, 토압, 기타

5) 내진설계(학교시설 내진 설계기준고시)

다. 구조내력 상 필요한 내력벽의 설치 검토

1) 내력 상 필요한 벽량의 확보

2) 내력벽의 두께 및 길이

3) 내력벽의 구조 검토

라. 경제적이고 시공이 용이한 구조의 선택

1) 구조상 불필요한 부분의 제거 및 과대한 부재 단면의 축소 검토

2) 시공 및 구법이 용이한 구조 계획

3) 구조의 안전에 필요한 부재의 최소 단면 결정

마. 구조물 신축에 대비한 신축줄눈 설치

1) 구조 연장이 긴 경우와 이질재간의 접합부, 기타 필요한 경우 줄눈 설치

2) 설치 위치에 적합한 줄눈 종류 결정

8. 설계도면 작성에 관한 사항

가. 각종표기, 기호 및 방법은 관계 기준에 맞게 표기

나. 시공 및 적산이 가능토록 각종 상세도 작성

1) 각종 치수의 정확한 명기

2) 각종 사용자재의 명칭 기입

3) 각종 자재의 규격, 품질, 형태의 표시

4) 각종 설비계통의 명확한 표시

5) 조경자재의 수종, 규격, 위치 등을 정확히 표시

다. 설계도서 상 설계 책임자의 서명 또는 날인

9. 시방서 작성에 관한 사항

가. 시방서는 일반시방서와 특기시방서를 구분 작성한다.

나. 특기시방서는 일반시방서에 명시되지 않은 다음 사항을 포함 작성하여야 한다.

1) 재료의 규격, 품질, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항

2) 각종 자재의 설치방법(가공, 조립, 부착 등)에 관한 사항

3) 각종 가설물(가설, 건물, 울타리, 흙막이공법 등)에 관한 사항

4) 각종 구조공법(말뚝박기, 배근, 용접 등)에 관한 사항

5) 재료의 배합과 양생에 관한 사항

다. 공사시방서 내용은 본 공사에 해당되는 부분만 작성하여야 한다.

10. 현장인계에 관한 사항

설계도서를 납품한 후 우리 청 담당자에게 도근점, T.B.M 등을 인계하여야 한다.

4

계 획 설 계 지 침

1. 계획 설계도서 작성

가. 설계방향

1) 우리 청에서 제시하는 과업내용과 각종자료를 분석하고 제반요소에 적합한 설계안을 제시하여 추후 중간 및 실시설계 용역을 수행할 시 기본이 되도록 하여야 한다.

2) 계획설계 진행과정을 우리 청과 수시로 협의하여야 한다.

3) 계획설계를 수행함에 있어서 건축법 및 기타 제반법규와 설계기준 및 과업지침서에 합당하여야 한다.

4) 계획설계 과정에 있어서 본 지침 및 일반 사항에 의하여 작성하되 미비 또는 의문사항이 있을 시 우리 청과 협의하여야 한다.

나. 관련법규 검토

- 건축구조기준, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

- 장애인·노인·임산부 등의 편의 증진에 관한 법률

- 공중화장실 등에 관한 법률

- 건축법

- 건설산업기본법

- 건설기술진흥법

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

- 도로법

- 하천법

- 폐기물관리법

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

- 주차장법

- 환경보건법

- 학교보건법

- 학교시설사업촉진법

- 고등학교 이하 각급학교 설립·운영 규정

- 학교 안전사고 예방 및 보상에 관한 법률

- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

- 기타 학교시설물 증축과 관련된 법률 및 규정 준수

다. 부지 현황 조사

1) 학교 부지를 포함한 주변부지의 자연환경조사

가) 지형, 지세

나) 토질, 지반

다) 식생, 수리, 홍수

라) 조망, 시야의 조사

2) 인문 환경조사

가) 학생·교사·학부모의 요구, 사용규범, 행위·활동의 조사

나) 사회계층의 조사, 사회의 욕구조사

다) 조각, 회화, 음악적 특유성의 조사

라) 정치·경제적 시대성 조사 및 시대의 유행조사

3) 기반시설의 조사

가) 도로 및 차량 동선의 조사

나) 보행자 도로 및 보행 동선의 조사

다) 파출소, 병원, 우체국 등 학교와 연결되는 도시의 사회적 기반시설 조사

라) 상·하수, 오·폐수 등 학교와 연결되는 도시의 기술적 기반시설의 조사

마) 운동장 등 사용할 수 있는 주변 시설의 조사

라. 설계기준 및 여건분석

1) 사용자 요구사항 적용

- 최근 3년간 우수시설학교 사례조사 및 벤치마킹을 통한 분석

2) 주변환경 분석

- 대상지역의 위치 및 세력권 분석

- 대상지역의 지형, 소음, 전망 등을 분석

- 동선의 분석

3) 방과 후 활용을 고려한 개방 가능실과 학생, 교사 전용 시설의 분리

- 학교시설을 이용한 방과 후 프로그램 분석

․ 특기·적성교육

․ 평생교육(지역주민 개방)

- 교수·학습방법에 의한 필요 공간 분석

4) 학생 동선 분석

- 학교 내에서 학생의 동선 추적

- 학생, 자동차 동선

- 보도 차도 공간 분리

5) 생태학교 조성 방향 제시

- 생태환경의 제공으로 환경부하 감소

- 자연환경을 도입, 생활권 녹지공간 및 생태학습 공간 제공

- 학생, 교사, 지역주민의 학습·여가·휴식 등의 생활공간 제공

- 지역사회와 연계되어 환경친화적 공간 제공과 중심 문화시설로의 역할 수행

6) 에너지 절약학교 조성

- 학교건물의 에너지 절약을 위한 전반적인 사항 제시

- 대지여건을 고려한 효율적인 에너지 이용방법 분석 등

7) 건강한 실내 환경 조성

- 환경기준에 적합한 건강하고 쾌적한 교육환경 조성 방안 고려

- 사용 자재 및 시공방법 등 실내 유해화학물질 발생 저감 방안 고려

- 자연채광, 환기, 통풍 등 배려

8) 기타

- 학교에서 사용하는 물의 효율적인 사용과 안전한 물 공급이 이루어질 수 있는 학교건축의 방향 제시

- 실내 및 옥외 공간의 무장애 공간계획

- 건물의 형태 및 동선 상의 무장애 계획

- 기타 관련법규 검토 등

마. 기본구상

1) 기본방향

- 학생 및 학급수에 따른 강당 규모의 결정

- 실의 연관관계 결정

- 실의 규모 결정

- 동선에 따르는 실의 위치설정

- 여가활동에 따르는 외부공간의 결정

- 토지 내의 건물의 축 설정

- 지역사회 시설로서의 학교시설계획 등

2) 기본 및 모듈의 설정

- 교실형에 따른 실의 가로 및 세로의 길이

- 학생의 활동에 의한 외부공간의 크기선정

- 교실 내 시설물의 크기

3) 토지이용(Zoning)

- 토지 내 이용을 고려한 토지이용(안) 선정

4) 건물의 크기 및 형태

- 선정된 토지이용(안)에 건물의 형태와 크기에 관한 위치를 고려 3가지 기본구상(안) 제시

- 각 대안별 기본방향 및 기준에 견주어 평가 후 1개안 선정

5) 기본구상 협의

- 기본구상 및 연구 전반 협의

6) 건물의 배치

- 배치계획: 건물 및 옥외공간 배치(차량, 보행자 동선 표기)

- 평면계획: 각 층별 평면도 작성 및 치수기입

- 입면계획: 2방향 이상의 입면도 작성 및 주요 외장재 기입

5

중 간 설 계 지 침

1. 중간 설계도서 작성

가. 설계방향

1) 계약상대자는 승인된 계획 설계안에 따라 다음과 같이 중간설계를 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 우리 청이 승인하기 위하여 요구하는 합리적인 중간 설계안을 준비하여 제출(지역·지구에 따른 건축법규 분석과 추정 공사비 산출 포함)하여야 한다.

3) 외벽, 지붕, 구조, 실의 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야 한다.

4) 설계 요구 조건을 만족하여야 한다.

나. 과업 내용

1) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 파악

나) 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

다) 관련시설의 사전조사와 수요자 요구사항 조사 및 협의

라) 유사 사례 및 관계법령 조사

마) 각종 설계협의

바) 관련 기관과의 협의

2) 조건 설정

가) 설계 조건의 설정

- 요구 성능 확인

- 법령 및 기타 제약 조건의 정리

- 안전 성능의 설정

- 공사 예산의 파악

나) 설계 방침의 설정

- 설계 개념의 확립

- 개략 공사시방서의 설정

- 사용 재료 및 기기 등의 설정

다) 비교 및 검토

- 성능 면에서의 기능 검토

- 설계 이념·의장 및 구조 형식 등의 검토

- 공사비 및 시공성 검토, 사용기기, 재료 등 검토

- 유지관리상의 검토

- 시방, 구조 방식 등의 종합적 검토

- 지하 매설물 이설 및 보강공법 비교 검토

라) 종합화

- 기능 배치 계획의 선정

- 공간 구성 계획의 선정

- 공사비 배분 계획의 선정

- 동선 계획의 선정

- 방재 계획의 선정

- 시설 배치 계획의 선정

- 평면, 입면, 단면 계획의 선정

- 구조 계획의 선정

- 내·외 환경 계획의 선정

- 조경 계획의 선정

- 수요자의 요구사항 종합 및 선정

- 토사운용계획, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계측 포함), 포장계획, 상·하수도 계획

6

실 시 설 계 지 침

1. 실시 설계도서 작성

가. 설계방향

1) 계약상대자는 승인된 중간설계안을 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 실시설계를 수행하여야 한다.

2) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용·인력·장비 등 유지관리방법을 제시하여야 한다.

3) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토·반영되도록 하여야 한다.

4) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍·혹서·혹한 등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 산정하여야 한다.

5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 공사시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 우리 청이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

나. 과업 내용

1) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 상세한 파악

나) 현지 상세 조사 및 확인

다) 관련시설 상세조사와 수요자의 요구사항 확인

라) 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

마) 특수 공법 부분의 상세 조사

바) 각종 법령 수속에 대한 협의

2) 조건 설정

가) 중간설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

- 각 부분의 요구 성능의 확인

- 법령, 기타 제약 조건 파악

- 각종 하중 조건 및 해석 방법 설정

- 각 설비의 요구 성능의 확인

나) 공사비의 파악

다) 기자재 배치 결정

3) 비교·검토

가) 각 부분 기능의 검토

나) 공간 표현의 검토(형태의 검토 및 사용 재료의 검토)

다) 공사비 및 시공기술의 검토

라) 각종 설비 방식의 검토 및 유지관리에 관한 검토

마) 사용기기 및 사용 재료의 검토

바) 관계법령 등의 조합 및 검토

4) 종합화

가) 외부 및 내부 공간 설계

나) 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

다) 평면, 단면, 입면 및 상세설계

라) 공사비 예산과의 조정

마) 방재 설계, 응력 해석 및 구조 설계

바) 색채 계획의 수립

사) 신·재생에너지 이용설비 계획의 검토 조정

아) 사용 재료, 사용기기 및 사양 결정

자) 수요자의 요구사항 결정

차) 각종 설계 등의 조정

다. 재료선정 기준

각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상·질감·무늬 등이 적합한 재료를 선택하되 다음사항에 유의하여야 한다.

1) 경제성을 고려할 것

2) 색채의 조화 및 통일성을 기할 것

3) 내구성 있는 재료를 선택할 것

4) 유지보수가 용이한 재료를 선택할 것

5) 질감의 적정성을 기할 것

라. 각부 재료

1) 외벽재료

외부색채와 질감 및 미관을 고려하여 재료를 선정하여야 한다.

2) 내부바닥

경제성, 소음 발생, 위생관리, 유지관리상 적정한 제품으로 선정하여야 한다.

3) 내벽재료

각 실의 용도 및 특성을 고려하여 경제성 있는 재료를 선정하여야 한다.

4) 천정재료

실의 기능에 따라 흡음성을 고려하여 선정하여야 한다.

5) 창호재료

에너지효율등급 성능을 만족하는 자재로 검토하되 경제성, 단열성 등을 고려하여 선정하여야 한다.

6) 방수 및 단열재료

내구성, 시공성, 경제성 등을 고려하여 선정하여야 한다.

2. 실시 설계도서 납품

11. 설계도서 작성 및 납품(2-다. 최종성과품 종류 및 납품수량) 참조

7

건축공사 설계지침

1. 기본 지침

가. 설계 주안점 및 고려사항

1) 사업의 목적을 인지하고 사업개요 등을 참고하여 계획, 중간, 실시설계를 하여야 한다.

2) 배치계획은 대지의 특성 및 요구조건, 지구단위계획, 인접 건축물, 요구 조건과 승인된 전체 마스터플랜 등을 고려하여야 계획한다.

3) 교육과정 등 원활한 교육활동 제공을 위해 학생들의 이동과 접근성에 혼잡이 없도록 계획한다.(보차도 분리 등)

4) 내부 공간의 기본 구성은 학생 상호 간 소통과 교류가 이루어질 수 있는 환경이 되어야 하며, 학생 활동 관련(휴게, 학습 등) 주요 활동이 가능한 공간을 계획한다.

5) 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용)을 지양하고 학생 중심의 평면과 공간을 내실있게 계획한다.

6) 입지 현황을 고려하여 총공사비는 예정 공사비를 초과하지 않도록 설계한다.

7) 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 설비기준령 등 관련 법규에 위배되지 않도록 계획한다.

8) 옥외공간 설계 시 생태 환경을 이해할 수 있는 자연적 공간으로 구성하여 감수성 증대와 학생 상호 간의 사회성 증진을 위한 공간으로 계획한다.

9) 제안된 스페이스 프로그램의 모듈을 적용하되 단위공간의 형태는 자유롭게 제안할 수 있으며, 사전기획 적정성 검토 세부의견서를 참조하여 계획한다.

10) 지역주민과 공유 가능한 다목적강당으로써 하나의 조닝 영역으로 구분하여 별도의 출입이 가능하도록 계획하고 주차장과 동선 연계를 통해 사용 및 활용성 있도록 계획한다.

2. 건축계획

가. 효율적인 배치계획

1) 배치계획은 소음 등 환경 위해요소의 최소화를 고려한 계획하며 기존 본관동 및 운동장과의 접근성 및 연계성을 고려한다.

2) 건물은 대지의 향, 일조 및 주 풍향 등을 고려하여 적절히 배치하여야 한다.

3) 배치계획은 반드시 건물간의 높이, Mass, 균형 등 미적 균형감이 고려되어야 하며, 에너지효율을 고려한 배치계획을 고려한다.

4) 부지 내 무단차 계획을 통해 장애인, 노약자의 접근을 고려한다.

5) 범죄예방 환경설계 기법 적용으로 안전한 공간 환경을 조성한다.

6) 기존 교내 주차장은 학생들의 활동공간과 분리해 최대한 학생들의 안전이 확보될 수 있도록 하고 필요시 안전시설 등을 설치해 보차분리 및 보행 안전을 고려한다.

7) 비상 차량 동선 및 추후 증축 예정인 급식소를 위한 업무 차량의 학교 내 진입 시 사용자 보행 동선과 간섭되지 않고 안전을 고려한 진입로를 고려한다.

8) 사용자 참여를 통해 제시된 배치 대안을 배치에 영향을 미치는 다양한 요인을 분석하여 계획한다.

나. 학생중심의 평면(공간) 구성

1) 학생들에게 편리한 교육환경을 제공하고 동선 확보가 용이하도록 평면계획을 하며, 유지관리 측면에서는 비용이 최소화 될 수 있도록 계획하여야 한다.

2) 기능별로 연관성을 갖는 실들은 인접 배치하여 사용자가 이용 시 편리하도록 고려하며, 각 실의 기능에 맞는 창호, 설비, 마감재 등을 계획에 반영한다.

3) 제공된 스페이스 프로그램의 모듈을 참고하고 계획 시에는 초등학교 특성에 맞게 다양한 모듈을 검토하여 적용하도록 한다.

4) 실 소요 공간의 종류, 규모, 배치는 스페이스 프로그램에 의하며 학교 운영에 차질이 없도록 전문적인 학습환경 조성과 유연성 있는 공간구조를 제공하여야 한다.

5) 공용사용 공간은 혼잡이 발생되지 않도록 동선 분리하며, 주 공간은 자연채광 등 쾌적한 장소가 될 수 있도록 아이디어를 제안한다.

6) 건물 내 교육프로그램 뿐만이 아니라 안·밖의 모든 공간이 체육, 놀이, 체험활동을 포함하여 다양한 교육활동이 가능하도록 세심하게 계획한다.

7) 시간대별 교육 행위(Activity)와 교육프로그램을 분석하여 분석 결과가 유기적으로 반영될 수 있도록 계획한다.

8) 다목적강당 및 급식소는 최대한 자연환기가 가능하도록 계획하여, 설비 및 유지관리에 필요한 비용이 최소화될 수 있도록 한다.

9) 누수의 우려가 있는 화장실 하부에 타 용도 실 계획을 지양한다.

10) 학생 및 장애인의 편의를 감안하여 출입구의 턱 발생을 지양하고, 출입문의 개폐 시 불편함이 없도록 계획한다.

다. 입면 및 단면 계획

1) 자연친화적인 소재(마감재 등)을 사용하여 인근 자연의 이미지가 부각 및 연계되도록 계획한다.

2) 외부 입면은 다른 건물들의 디자인과 연계될 수 있는 방향으로 계획한다.

3) 입면에 변화를 주기 위한 과도한 평면의 돌출이나 장식벽 등은 지양하고, 단순하면서 세련된 형태의 입면계획을 반영한다.

4) 창호 설계시 채광 및 환기를 고려하되, 창호를 통한 열손실이 과다하게 발생되지 않도록 적정 창호 면적비를 산정하여 계획하며, 입면 효과를 위한 커튼월 설계는 지양하고 해당 실의 기능에 적합한 창호를 계획한다.

라. 구조계획

1) 모듈, 층고, 기초 및 구조방식 등은 건축구조에 관한 법률, 기준, 규정에서 제시하는 안전성을 확보하여야 하며 경제적인 설계를 하되 시공성을 고려하여 최종 적용하여야 한다.

2) 층고는 다목적강당 용도에 맞는 개방감 및 환기방식, 냉·난방, 천장고 등을 감안하여 최종 적용하여야 한다.

3) 지진에 대비하여 관계 법령에 적합한 내진설계를 최종 적용하여야 한다.

가) 지진 발생 시 인명을 지키고 재해 이후의 교육활동이 조기에 가능하도록 시설이나 설비가 충분한 내진성능을 확보토록 한다.

나) 학교 시설은 지진 등의 재해 발생 시 지역주민의 응급 피난 장소로서의 역할도 주어지기 때문에 이에 대비한 기능도 계획하는 것이 필요하다.

4) 건축물의 풍하중 산정 시 주골조의 풍하중 뿐만아니라 외장재(외장재와 이를 지지하는 철물, 부골재)의 설계용 풍하중도 고려하도록 되어있으니 이에 대하여 검토한다.

5) 주요 구조부의 구성 재료는 건축구조기술사의 최종 확인으로 적용하여야 한다.

6) 기초 형식 및 공법에 대해서는 최적안을 적용하여야 한다.

7) 관련 법령 및 규정에서 제시하는 모든 하중을 적용하여야 하며, 태풍·각종 풍수해 및 화재에 대해서도 검토하여 적용하여야 한다.

마. 안전 및 범죄예방 계획

1) 국토교통부 『건축물의 범죄예방 설계 가이드라인』 및 교육부『교육시설 안전관리 매뉴얼』에 따라 공간을 구획하고 필요한 안전시설을 계획하여야 한다.

2) 모든 시설은 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률』등에 의거하여 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립·반영하여 무장애(Barrier Free) 학교시설을 계획하도록 한다.

8

토목공사 설계지침

1. 현황조사

계약상대자는 학교부지에 대한 현황, 경계, 지적 등을 종합 검토하여 기초자료를 수집하고 설계에 반영하여야 한다.

2. 부지조성

가. 부지정지는 홍수 시에도 자연배수가 가능하게 지반 계획고를 결정하여야 한다.

나. 토공계획은 절토, 성토 비율을 가능한 한 1:1로 설계토록 하고, 부득이한 경우 토사유입 및 반출은 합당한 장소를 선정하여 설계하여야 한다.

다. 현지여건에 따라 필요 시 축대(옹벽 등) 및 비탈면 보호공을 설치하여야 한다.

3. 담장

가. 주위환경을 고려하여 투시형 울타리 또는 메쉬휀스 등으로 계획하고, 운동장부분은 체육활동 시 학교 밖으로 공이 넘어가는 것을 방지할 수 있도록 적정한 높이로 계획하여야 한다.

나. 울타리 주변은 조경을 식재할 수 있는 녹지 공간을 최대한 고려하여 계획하여야 한다.

4. 배수

가. 하수시설 단면은 유량계산에 의거 결정하고, 유량계산 강우강도는 해당지역 20년에 1회 빈도의 강우강도를 사용하여야 한다.

나. 분뇨하수 및 생활하수와 우수처리는 분리배수를 원칙으로 하여 인근 기반시설 실정에 맞도록 계획하여야 한다.

다. 운동장 표면수 처리를 위하여 적정한 구배를 주어야 하며 필요시 맹암거를 설치할 수 있다.

라. 배수시설은 U형측구, 흄관매설, 맨홀, 집수정 BOX암거, 운동장 맹암거 등을 복합하여 가장 경제적이고 영구적인 배수형식을 취하고, 각종 배수시설의 뚜껑은 기성콘크리트 제품 또는 철물제품(주철 또는 스틸그레이팅)을 사용하여야 한다.

5. 포장

가. 포장재료는 콘크리트, 칼라콘크리트, 아스콘, 인조화강석블럭, 고무블럭, 점토블럭, 잔디블럭 등 현지 실정에 부합되도록 충분한 자료를 분석·수집 후 결정하여야 한다.

나. 경계석은 시중 기성제품(콘크리트, 화강석) 사용을 원칙으로 한다.

다. 포장 재료는 보·차도용으로 구분하여 적절히 적용하여야 한다.

6. 기타

가. 현장 조사분석을 통하여 주변 현황에 부합되는 설계가 되도록 하고 토공 물량이 최소화 될 수 있는 경제적인 계획을 한다.

나. 토목설계 관련 법규 및 지침, 지구단위계획, 건축허가 협의 사항 등을 준수하여 설계에 반영하고, 토공사로 인하여 주변 건축물 및 시설물에 대한 피해가 발생되지 않도록 주변 현황을 조사하여 안전성을 검토 후 이에 대한 조치를 전문기술자가 확인하여 설계에 반영한다.

다. 장비 및자재 선정시 적정한 품질확보와 경제적 설계가 되도록 한다.

라. 우수처리계획, 오수처리계획, 구조물계획, 포장공사 등을 설계에 반영한다. 특히, 운동장은 배수가 원활히 이루어질 수 있도록 설계 시 유의한다.

마. 지형조정에 따른 옹벽이 최소화될 수 있도록 하며, 단차 발생을 최소화하여 안전한 학교 환경을 조성한다.

9

조경공사 설계지침

1.  일반사항

가. 설계목적

학생들에게 휴식·운동 및 놀이를 즐길 수 있는 옥외활동 장소를 마련해 주고 지역적, 문화적 특성 및 주변 환경의 정서 등을 고려하여 학교의 특성에 맞는 아름다운 녹지 및 시설 경관을 조성하여 건강하고 쾌적하게 학습할 수 있는 학교 교육환경을 조성한다.

나. 설계범위

1) 조경계획은 관련법규 및 기준에 적합하고 친환경 건축물 인증이 가능토록 하여야 하며, 아울러 관목 및 교목의 비율은 적정하게 고려하여야 한다.

2) 건축 및 토목계획에 의거 설계의 합리성, 구조물의 안정성, 설치시설의 적정성 등에 관한 사항을 분석하여 식재 및 조경시설물을 확정하여야 한다.

3) 공종별 계획을 근거로 실시설계 이전에 공종별 세부설계 기준안을 작성하여야 한다.

4) 각 평면계획의 일반적인 현황(위치, 면적, 현 상태 등)이 도입시설의 적정성, 주제의 이미지 형성 정도를 분석하고 이에 관련된 사항들이 논리적 기술적으로 타당성이 인정될 수 있어야 한다.

5) 주변 환경 및 입지여건을 분석하여 주위와 조화되게 배치하여야 한다.

6) 각종 자재는 경제적이고 내구성이 있는 재료로 할 것이며, 목적물 외의 이미지 형상에 적합한 것으로 채택하여야 한다.

다. 설계 시행 방법

1) 부지의 특성과 배경을 기본으로 한 설계방향을 설정하고 기술적, 경제적 타당성이 검토되어야 하며, 환경 보호와 이용이 합리적으로 계획될 수 있도록 공간개념을 설정하고 이를 토대로 적정한 기능이 부여되도록 계획되어야 한다.

2) 학교를 상징할 수 있는 수종이나 향토수종, 고장을 상징할 수 있는 수종을 선택하며, 보존가치가 있는 수목이나 식물은 이식 될 수 있도록 설계에 미리 반영하여야 한다.

3) 조경대상지는 주변의 생태환경을 고려하고, 절·성토 사면은 자연환경 훼손을 최소화 하며, 환경 친화적인 방법으로 복구·복원방안을 수립하여야 한다.

4) 생태학습의 장(생태 연못 등)으로 활용되는 공간은 친환경 건축물인증에 적합한 규모로 조성하고 학생들의 자연학습, 체육, 여가, 휴식 등의 공간으로 활용할 수 있도록 계획하여야 한다.

5) 소음이 예상되는 부분에는 밀식 수림대를 조성하고, 조경시설물에는 파고라, 벤치, 앉음벽 등의 휴게시설과 생태연못, 산책로 등을 계획하고 녹화구역과 조화롭게 계획되어야 한다.

6) 보행로, 광장, 휴게시설 등의 포장구간은 일정한 문양을 넣어 각 공간별 특성을 살리도록 하며, 토목분야의 포장설계와 상호 연계하여야 한다.

7) 옥상녹화 계획 시는 건물구조에 지장이 없도록 구조보강 또는 경량토를 사용하고, 학생들의 안전을 고려하여 파라펫 난간 상부에 별도의 난간을 계획한다.

8) 조경시설은 기성품과 현장 제작품에 대해 경제성과 시공 난이도 등을 비교 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

2. 기타

가. 조경계획은 관련법 및 상위계획을 반영하여 적합하게 계획한다.

나. 외부공간 계획 시 학생들의 휴게 및 정서를 고려하여 실용적이고 활용성이 뛰어난 시설물 및 식재계획을 한다.

다. 식재계획 수목선정 시 학생들의 학습과 연계된 수종 선택을 고려한다.

라. 도로와 연접한 녹지에는 차량소음 및 분진 차단 등을 고려하여 공해에 강한 수종을 선정한다.

마. 수목은 경관을 고려한 녹음이 풍부하고 계절적 경관의 변화를 고려한 수종으로 선정하고 공간구성을 계획한다.

바. 배식계획에는 수목의 종류 및 규격을 명시하고, 개략공사비 내역을 제시하여야 한다.

사. 인접한 토지의 이용계획을 감안하여 조경계획을 수립한다.

10

지질조사 지침

1. 목적

본 과업은 증축공사에 필요한 지질 및 지층상태를 조사하여 건물기초 공법의 설계에 활용하는데 목적이 있다.

2. 조사내용

가. 토층 배열 및 지층상태 심도조사

나. 층별 지내력, 표준관입시험, 전단파시험

다. 시행공수: 3공(NX-1공, BX-2공, DHT 1회)을 기준으로 조사 한다.

3. 특기사항

가. 본 지질조사는 우리 청 담당자와 협의에 의하여 정밀, 정확하게 조사하여야 하며, 최단 시일 내에 작업이 완료될 수 있도록 최선을 다하여야 한다.

나. 천공위치는 우리 청에서 선정하며 작업시행자는 반드시 지반고 및 좌표를 정하여 그 장소에 작업을 실시하여야 한다.

다. 작업 중 우리 청 담당자가 심도조사, 표준관입시험 및 기타 필요한 사항을 판별 또는 자료를 얻고자 할 때에는 작업을 중단시킬 수 있으며, 계약상대자는 지질조사자로 하여금 이에 대한 충분한 설명 및 제반사항에 대하여 자료 요구 시 제출하여야 한다.

라. 보링 시추 깊이는 별도로 지시하며 시추공 및 지층별 성과표를 작성하여야 한다.

마. 표준관입시험에서 얻어진 시료는 표준시료이어야 하며, 시료를 시료상자에 정리하여 설계납품 시 제출하여야 한다.

바. 코아 재취된 시료는 토사 및 암별(풍화암, 연암, 보통암, 경암등)로 구분하여 보관하여야 한다.

사. 계약상대자는 토사층 및 암반층을 토질역학상 분류하고 건축공사 기초공법 등을 결정할 수 있도록 성과보고서에 자세히 기술하여야 한다.

아. 계약상대자는 보고서 8부를 작성 제출하고, 보고서 내용에 특히 아래 사항을 포함하여야 한다.

1) 조사방법(조사에 사용한 기계 및 기구명 등 표기)

2) 조사내용(지질개요, 토사층 및 암반층에 대한 기술적이 상세한 설명)

3) 조사길이(보통암 0.5m까지)

4) 조사결과

- 시추공사 위치도

- 시추 성과표

- 표준관입시험 성과표(기초설계를 위한 예상 암반 및 예상선도)

- 지내력 판정설명서 (기초설계를 위한 시공방법 및 지내력에 대한 설명)

- 사진(작업 및 시험 관경)

- 기타 필요한 사항 및 감독자가 요구한 사항

5) 시험 및 채취한 시료는 토사별 암별로 분리 시료상자에 보관하여 제출

4. 기타사항

가. 천재지변 및 기타 사유 등으로 인하여 작업이 중단되었을 때에는 즉시 우리 청에 보고하고 지시에 따라야 하며, 부득이한 사정으로 인하여 지질조사를 시행치 못할 시에는 정산처리 한다.

나. 본 작업으로 인하여 민원 및 기타(민·형사상)사항의 문제가 발생되지 않도록 하여야 하며, 문제 발생 시 계약상대자가 모든 책임을 진다.

11

설계도서 작성 및 납품

1. 설계도서 작성

■ 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2024-907호) 별표(설계도서 작성방법)에 따른 단계별(계획·중간·실시설계) 설계도서를 작성하여야 한다.

가. 설계 설명서

1) 공통분야: 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 작성하여야 한다.

2) 건축분야: 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면·입면·주요 단면 선정, 구조·부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 주차계획, 동선계획, 전시 동선계획, 에너지절약 계획, 건축 구조계획, 공정계획 및 세부 공사비 등

3) 토목분야: 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 골재원 및 사토장 선정, 배수처리계획(공사중 계획 포함), 신기술·신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가

4) 조경분야: 토양조사 결과, 배수, 식재 및 시설물 계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획 계획 등

5) 설계 설명서에 포함될 사항

가) 설계 주안점(테마, 스토리, 지역 및 학교 특성 등)

나) 설계 진행과정 일체

다) 조감도, 설계 개요, 대지 현황, 우수시설 사례조사, 법규 검토서

라) 건축계획, 구조계획, 토목계획, 조경계획

마) 기계설비계획, 전기·통신계획, 소방계획 등

바) 그 외 발주기관에서 요청하는 사항

나. 각종계산서 등

1) 각종 구조계산서, 지질조사보고서, 수리계산서, 에너지 절약계획서 등 포함

2) 물량산출서

- 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

- 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출하여야 한다.

다. 설계도면

1) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성하여야 하며, 설계도서 상호간 모순·오기·누락·불분명성·외래어 표기 등이 없어야 한다.

2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성하여야 한다.

3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

4) 설계도면에는 주석(Note) 란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록하여야 한다.

5) 설계도면에는 관련 도면 란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면 명을 표기하여야 한다.

6) 설계도면 작성은 AUTO CAD 2012 소프트웨어와 상호 호환되는 제품을 사용하여 우리 청 컴퓨터와 완벽하게 상호 호환되도록 조치하여야 한다.

7) 설계도면 파일은 출력도면 외에 CD로 제출하여야 하며, 각 파일은 개별 열람 및 수정이 가능하도록 조치(파일압축 불가)하고, 도면 Font 및 Plot style 파일을 함께 저장하여 제출하여야 한다.(파일색인 목록 CD표지에 부착)

라. 주요자재 선정 검토서 작성

1) 주요자재(시멘트, 철근, 레미콘 등)는 도급자 관급자재로 명기하여야 한다.

2) 주요자재에 대하여 상세히 비교·분석(특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품, 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 및 기능성, 안전성, 기밀성, 친환경성 등)한 자료를 서면으로 제출하여야 한다.

마. 공사시방서

1) 공사시방서는 국토교통부 건설공사표준시방서를 기준으로 작성하여야 하며, 공사시방서를 작성할 경우는 자재·공사여건 등을 고려하여 당해 공사조건에 적합하게 시방서 내용을 수정·보완 또는 선택하여 시방서를 작성하여야 한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

- 해당 건설공사 표준공사시방서 및 전문공사시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

- 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

- 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

- 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 작성기준 등 필요한 사항

- 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기, 절차 등에 관한 세부사항

- 우리 청과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

- 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

- 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

- 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

- 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

- 기타 주요공사 사항

3) 공사시방서 작성 시 유의사항

- 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

- 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성하여야 한다.

- 표준양식을 사용하도록 하고, 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

- 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성하여야 한다.

- 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성하여야 한다.

- 사용자재는 자재선정위원회에서 선정되는 등 특별한 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭 또는 일반적인 용어를 사용하여야 한다.

- 설계여건 상 신기술·신공법·특허공법·특허기술을 채택하여야 할 경우에는 동 기술이나 공법을 적용해야하는 사유(타당성, 비교 검토서 포함)을 제시한 후 우리 청에서 주관하는 공정성 있는 자재선정위원회를 통하여 결정하여야 한다.

바. 공사내역서

1) 공사내역서 작성은 국토교통부 제정 건설공사표준품셈을 기준으로 하되 우리 청과 협의하여 적용하여야 하며, 내역서 파일은 조달청 및 우리 청에서 요구하는 파일로 제출하여야 한다.

2) 공사내역서는“지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준”에 의하여 산출하되, 아래 기준을 참고하여 산출한다.

가) 재료비

- 조달청장이 조사하여 통보한 가격(시장시공단가)으로 한다.

- 조달청장이 조사한 가격에 없는 자재는 기획재정부에 등록한 전문가격조사기관에서 조사·공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최적가격을 적용 하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

- 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 유효한 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 최적가격을 적용하여야 한다.

나) 직접노무비: 대한건설협회에서 공표한 시중 노임을 적용하여야 한다.

다) 일정규모 이상 공사에서 사용하는 자재는 발주자가 직접구매(관급)토록 관련사항을 설계도서에 표기하여야 한다.(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조)

라) 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우에는 관급자재의 범위 및 품목을 우리 청과 미리 협의하여 선정하고, 직접구매(관급구매) 할 수 없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하도록 관련 설계도서에 표기하여야 한다.(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조)

※ 직접구매 대상 자재는 공개경쟁입찰을 위한 특기시방서 및 물품규격서를 작성하여 제출하여야 한다.

3) 필요한 경우 공사비에 지장물 이설비, 에너지 인입 공사비 및 정밀안전진단비, 시운전비, 실내 공기질 측정비, 기타시험비, 친환경인증비, 기존 건물 철거비, 폐기물처리비(100톤이상 시 별도 작성) 등을 포함하여 내역서에 반영하여야 한다.

4) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 한다.

5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

6) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

7) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

8) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

9) 운반비는 목적지, 운반 장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

사. 예정공정표 작성

예정공정표는 PERT 또는 CPM 기법으로 작성하고, A3 규격으로 축소하여 제출하여야 한다.

아. 지장물 조서 및 인·허가 도서

1) 지장물 조서 작성

- 지장물은 우리 청과 협의하여 그 범위 등을 조사하여 결정하여야 한다.

- 사업시행으로 인해 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재하여야 한다.

2) 인·허가 도서 작성

- 관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 용 도서를 작성한다.

자. 기타

1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

2) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만 규격을 달리할 경우 우리 청과 사전협의하여야 한다.

2. 설계도서 납품

가. 추진단계별 설계도서의 납품은 시기는 다음과 같이 구분한다.

1) 계획설계: 착수일로부터 15일 이내

2) 중간설계: 착수일로부터 35일 이내

3) 실시설계 최종납품: 착수일로부터 130일 이내

나. 최종성과품 제출은 예비검사 등 모든 검토, 협의, 승인 등이 완료된 후 과업수행 종료일 전에 납품하여야 한다.

다. 최종 성과품의 종류 및 납품수량

※ 납품 시 제출도서는 공사의 특성 및 종류에 따라 변경될 수 있음

구 분

규 격

납품수량

비고

1. 설계도면(공종별 구분)

A1출력, A3책철

3 부

A3출력, A4책철

6 부

A4출력, 좌편철

2 부

2. 설계원도(공종별 구분)

A3출력

1 부

보관바인더 포함

3. 건축축조승인서

(관련 서류 포함)

A4출력

2 부

4. 설계디스켓(CD)

(내역서, 산출서 포함)

·설계도서 일체

·설계도면 일체

2 개

1 개

5. 공사시방서

A4

6 부

6. 설계내역서

A4

3 부

7. 산출기초

A4

3 부

8. 일위대가표

A4

3 부

9. 서약서

A4, 참여기술자 전원

2 부

서명날인

10. 용역 참여기술자 명단

A4, 참여기술자 전원

2 부

서명날인

11. 구조계산서(구조확인서)

A4

6 부

12. 조감도

60cm × 90cm

2 식

액자

조감도 사진 8×10'

3 매

액자

13. 색채 계획서(도면 포함)

A4 책철

5 부

A3 좌편철

3 부

A4 색채계획 설명서

5 부

설계디스켓(CD)

2 개

14. 신기술적용 검토조서

A4

3 부

해당 시

15. 공사 예정공정표

네트워크식

5 부

16. 지반조사 검토보고서

A4,

5 부

해당 시

17. 기타 용역수행 관련자료

담당공무원의 요구자료

3 부

해당 시 작성 제출

【붙임 1】 스페이스프로그램: 구성은 다음과 같으나 설계자의 기획의도와 공간 활용에 따라서 변동되거나 통합될 수 있다.

층 수

구 분

용 도

실 수

계획면적(㎡)

비 고

1 층

공용부

계단실/E.V실

1

21.75

방풍실/홀

1

19.58

화장실

소 계

41.33

관리지원

체육교사실

소 계

지원시설

창 고

1

7.50

탈의실/샤워실

소 계

7.50

필로티

(489.37면적제외)

필로티

급식실로 추후사업 예정

소 계

합 계

48.83

2 층

공용부

계단실/E.V실

1

21.75

홀

1

45.27

화장실

2

42.48

전 실

1

4.23

소 계

113.73

관리지원

체육교사실

소 계

지원시설

창 고

1

7.50

탈의실/샤워실

소 계

7.50

다목적강당

다목적강당

1

421.20

소 계

421.20

합 계

542.43

연 면 적 (1층+2층)

591.26

※ 1층 필로티 공간 약 489.37㎡ 중 27.9㎡는 보관실(다목적강당 물품 창고)로 나머지는 급식실로 추후 사업 예정임.

※ 층수 및 건물 형태, 건축 구조 등은 추후 발주기관의 사정에 따라 변동될 수 있음.

【붙임 2】 부지 현황

- 토지계획현황, 지적도, 건축물대장 등은 직접 확인하여야 한다.

토지이용계획 확인

부지 전경 사진

【붙임 3】

주간 공정보고

□ 용 역 명: 계약명 기재

□ 용역개요

○ 용역기간: 2025.  .  . ~ 2025.  .  .

○ 계약금액: 000,000,000원

□ 용역진행사항

구  분

전주 진행사항(2025. . .)

금주 진행사항(2025. . .)

비고(진행률)

업무내용

- 인원투입현황

- 외주작업 진행현황 등

- 주요 협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 기재

- 건축, 토목 등 분야별로 구분되도록 작성

(실시/예정공정)실시공정/예정공정(%)을 표기

특기사항

문제점 및 해결책 등 표기

주      소:

상      호:

대  표  자:

책임기술자:                   (인)

경상북도김천교육지원청교육장 귀하

【붙임 4】

월간 공정보고

□ 용 역 명: 계약명 기재

□ 용역개요

○ 용역기간: 2025.  .  . ~ 2025.  .  .

○ 계약금액: 000,000,000원

□ 용역진행사항

구  분

월간 업무수행 내용(2025. . .~ 2025. . .)

비고(진행률)

첫째주

(실시/예정공정)

%로 기재

둘째주

셋째주

넷째주

다섯째주

기  타

- 공정 지연시: 지연의 구체적 사유 기재

주      소:

상      호:

대  표  자:

책임기술자:                   (인)

경상북도김천교육지원청교육장 귀하

감독1, 감리1, 현장1

감독1, 감리1, 현장2, 학교1, 보관1

증빙1, 보관1

감독1, 감리1, 현장2, 학교1, 보관1

감독1, 보관1, 증빙1

감독1, 보관2

감독1, 보관2

감독1, 감리1, 현장2, 학교1, 보관1

보관1, 학교1

감독3, 학교1, 보관1

현장2, 감리1

감독2, 보관1, 감리1, 현장1

감독3, 현장1, 보관1

감독1, 감리1, 현장1, 보관2