『부곡동 종합사회복지관 건립』

기본 및 실시설계용역 과업내용서

복지문화국

(복지정책과)

	목 차

Ⅰ. 총 칙
가. 과업의 명칭		3
나. 과업의 목적		3
다. 과업의 개요		3
라. 설계용역 일반사항		5
마. 적용기준 및 시방서		6
바. 보안 및 비밀 유지		7
Ⅱ. 일반지침
가. 공통사항		7
나. 설계 진행사항		11
다. 업무보고 및 회의		16
라. 기타업무		17
Ⅲ. 기술지침
가. 일반사항		18
나. 건축분야		19
다. 토목분야		22
라. 구조분야		27
마. 조경분야		30
바. 기계설비		32
사. 전기설비		40
아. 정보통신		43
자. 기타사항		44
차. 관련법규 적용기준		45
Ⅳ. 성과품 작성 및 납품
가. 일반사항		46
나. 성과품의 작성		47
다. 성과품의 납품		51
Ⅴ. 붙임 자료		52

Ⅰ. 총  칙

가. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은『부곡동 종합사회복지관 건립 기본 및 실시설계 용역』 이라 한다.

나. 과업의 목적

❍ 복지·문화 기반시설이 부족한 부곡‧송정지구에 종합사회복지관을 건립하여 지역주민의 다양한 욕구를 충족시켜주고 복지 인프라의 균형적 배치로 도시 균형발전을 도모하여 복지사각지대 해소 및 수요자 중심의 통합적 맞춤형 복지체계를 구축하고자 함.

다. 과업의 개요

사 업 명 : 부곡동 종합사회복지관 건립 기본 및 실시설계 용역

위    치 : 경기도 군포시 부곡동 1110-2

지역·지구 : 제2종일반주거지역ㆍ지구단위계획구역

주 용 도 : 노유자시설(사회복지시설)

부지면적 : 1,168.70㎡

건축규모 : 연면적 4,780㎡(지하2층, 지상4층)

건 폐 율 : 법정 60%이하

용 적 률 : 법정 230%이하

9) 주요시설 : 목욕탕, 경로식당, 다함께돌봄센터, 열린육아공간, 헬스장,

심리상담실, 프로그램실, 장애인전용 다목적실, 지하주차장 등

10) 예정공사비 : 12,649,000천원(부가세포함)

※ 건축, 기계, 토목, 전기, 소방, 통신, 조경, 구조, 조명, 인테리어, 사인물, 부지내 공공시설물(색채계획포함) 등의 설계비와, 지질조사, 측량, 건축협의, 실시계획인가 등 행정절차에 필요한 자료 작성 제반업무를 포함.

※ 예비인증(친환경건축물 인증등급, 에너지효율등급인증, 제로에너지건축물,BF등) 수수료는    발주기관 부담

11) 설계용역비 : 529,639천원(부가세포함)

12) 용역기간 : 착수일로부터 240일(공휴일포함)

13) 「지하안전관리에 관한 특별법」에 따른 소규모 지하안전영향평가 대상 시설물에 해당하지 않도록 설계하여야 한다.

구분	층	세부시설명	면적(㎡)	비 고
문화여가	지상 1층~4층	헬스장	200	운동기구 및 탈의실, 샤워실 설치
		프로그램실	250	교육, 문화, 여가 관련 프로그램 운영 5개소 설치, 개소당 50 ㎡
		강사대기실	-	프로그램 강사 휴게공간 10명 수용, 1인당 2.0 ㎡ 기준
장애인 기능지원		통합사무실	253.12	ㆍ사무실 115.2㎡(16명 수용, 1인 7.2㎡ 기준) ㆍ휴게실 30㎡(15명 수용, 1인 2.0㎡ 기준) ㆍ관장실 17.92㎡ ㆍ회의실 90㎡(중회의실 60㎡(1개소), 소회의실 30㎡(1개소))
		심리상담실	33	16.5㎡, 모듈 2개
		프로그램실	50	교육, 문화, 여가 관련 프로그램 운영 1개소 설치
		휴게실	-	환경 미화 및 시설관리 관련 근무자 휴게공간 10명 수용, 1인 2.0 ㎡ 기준
		장애인전용 다목적실	100	장애인 전용 쉼터, 장애인 및 가족지원 프로그램 운영
		창고	-	10.5㎡, 모듈 2개
아동육아		다함께 돌봄센터	120	아동시설(초등학생, 방과후 돌봄서비스)
		열린 육아공간	120	산모, 신생아 및 영유아 공동육아나눔·놀이공간
		소강당	160	100명 수용, 1인 1.8 ㎡ 기준(방송실 포함)
		카페테리아	-	실버카페 등으로 운영
노인복지		지상주차장	-	부지(필로티)를 활용한 최대 대수 확보(장애인 주차포함)
		경로식당	232	160명 수용, 1인 1.45 ㎡ 기준, 지상 1층에 설치
		자원봉사실	-	자원봉사자 대기실9명 수용, 1인 2.0 ㎡ 기준
		안내데스크	-	시설 및 프로그램 종합 안내
		공용면적	-	계단, 복도, 엘리베이터, 화장실(남,녀 장애인 화장실 각 층별 포함) 등 전체 연면적 35%이상 확보(주차장 포함)
가족복지 주차장	지하 1층	목욕탕	850	남/여 구분, 탈의실, 화장실(남,녀 장애인화장실 포함)등 계획
		주차램프	-
		공용면적	-	계단, 복도, 엘리베이터, 화장실(남,녀 장애인 화장실 포함) 등
주차장	지하 2층	지하주차장	-	부지를 활용한 최대 대수 확보(장애인 주차포함)
		기계실, 전기실, 방재실, 물탱크실	-
		공용면적	-	계단, 복도, 엘리베이터 등 전체 연면적 35%이상 확보(지상층 포함)

14) 세부시설 배치(안)

※ 제시된 공간계획은 최소한의 기본계획으로서 1층 필로티 등을 활용한 주차계획, 각 층별 면적 및 세부 시설별 전용면적

은 시설 법적기준, 기능 및 이용측면을 고려하여 전체 연면적 범위(±5%)내에서 설계자가 자유롭게 계획할 수 있으며,

층수와 층별 프로그램 배치는 목욕탕과 경로식당을 제외하고 설계자가 자유롭게 제안 할 수 있다.(향후 실시설계 시

발주청과 협의하여 조정될 수 있음)

라. 설계용역 일반사항

1) 설계용역의 정의

본 설계용역의 최종도면은 건축법, 소방시설 관련법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 지적법 등 관련 법규와 각종 고시 및 공고 기준에 위배됨이 없이 (관계 기관과의 건축협의, 소방협의 등 포함) 완료되어야 하며 법규 등이 개정되었을 경우에는 개정된 규정을 반영하여 설계하여야 한다.

2) 납 품

계획설계와 기본 및 실시설계를 구분하여 납품하도록 하되 심의ㆍ자문ㆍ협의  등 전반적인 일정과 설계용역 기간 등에 따라 일괄납품 조정 할 수 있다. 납품  도서 작성방법, 부수는 본 과업내용서 제4장 설계도서 납품도서 목록에 정하는  바에 의하나, 발주기관과 협의하여 조정할 수 있다.

3) 설계의 책임 및 손해배상

가) 책임 및 손해에 대하여는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·

시행령·시행규칙, 지방자치단체 용역계약 일반조건, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제90호), 설계 ‧건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무 요령(국토교통부 고시 제2017-219호), 건축사법 제20조 및 건축사법 시행령 제21조에 따르며, 보험증서 또는 공제증서를 용역 준공 시 제출하여야 한다.

나) 납품 이후에 공사 중 발생되는 설계변경사항(설계도서간 모순 및 현장여건에 의한 변경)에 대하여 기술적 자문과 협조요청에 대하여 공사 일정에 차질이 없도록 적극적으로 협조하여야 한다.

4) 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에      관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물      에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

5) 설계변경 및 정산

가) 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지 시키거나 과업을 변경할 필요가

있다고 인정될 때에는 설계 용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 발주기관의

방침에 따라야 한다. 이때 과업 범위의 증감이 발생할 경우에는 예산의 범위

내에서 당해 계약금액을 조정 할 수 있다.

나) 이때 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건(행정안전부 예규 제90호 2019.10.8.) 등에 따른다.

6) 용역수행자의 교체

가) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 경험과 자격을 갖추어야 하며, 발주기관은    용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우,    용역수행자의 교체를 요구할 수 있으며 설계자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따른다.

나) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 또는 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는        그와 동등이상의 등급·경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

다) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여       발주기관에 서면보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에       필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

7) 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음 사항에 대하여 발주기관에서 정한 감독관과 사전에 협의하여 과업을 수행한다.

가) 과업수행계획서 및 착수신고서 내용 변경

나) 주요 설계내용 및 방침 설정 또는 변경

다) 관계기관과의 협의사항

라) 용역수행자의 교체

마) 설계기준의 설정 또는 변경

바) 하도급사항

사) 공공측량계획

아) 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

8) 과업의 변경 등

가) 본 과업수행 중 발주기관의 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경사항이 발생 될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산 처리하거나 과업의 범위를 조정ㆍ변경 할 수 있다.

나) 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 설계자의 기술용역 정지, 기술용역의 이행 보증 등은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규) 제14장 용역계약 일반조건에 따른다.

마. 적용기준 및 시방서

1) 설계자는 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 관계법규 및 규정에 따른 설계기준 등    관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는    이에 대한 내용을 관련 기관과 문서로 협의하여야 한다.

2) 산업통상자원부 기술표준원에서 새로 제정되는 KSC IEC, KSC ISO 규정을 적극    참고 반영 하도록 한다.

3) 설계자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 등을 포함하여 제출한다.

바. 보안 및 비밀 유지

1) 보안 관계 법규의 준수

설계자는 정부 또는 발주기관의 필요한 보안 관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록       세심한 주의의 의무를 다하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 설계자가 지도록 한다.

2) 과업성과품 발간시 유의사항

설계자는 착수, 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독관과 협의하여 내용의 중요      도에 따라 대외비로 분류·관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 감독      관과 협의하여 발간한다.

3) 보안관리의 책임

설계자는 관계 법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 설계자의 과실이나 부주의로      인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 지도록 한다.

Ⅱ. 일반지침

가. 공통사항

1) 적용 요령

가) 용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 설계자가 보다 합리적인    방안으로 연구 발전시킨다.

나) 본 과업내용서 외에 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수하여야 하며, 본 과업     내용서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 과업내용서를 우선 적용한다.

다) 본 과업내용서에서 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이      불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 정한다.

라) 본 과업내용서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를    제출, 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

마) 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 발주기관에서      운영하는 설계자문회의 또는 기술심의를 거쳐 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

바) 이 기준에서 규정한 사항 이외에 설계도서의 작성에 필요한 사항은 한국산업규격     KSF1501건축제도 통칙이 정하는 바에 의한다.

사)“건축물의 설계도서 작성기준”(국토교통부고시 제2016-1025, 2016.12.30.) [별표]설     계도서 작성방법에 의거 계획설계, 중간설계, 실시설계 도서를 작성한다.

아) 안전사고 예방사례를 분석하여 위험공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한        꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

(1) 지하굴착 시 안전대책

(2) 구조물 변경 공사 시 안전대책

(3) 우기시 및 동절기 안전대책

(4) 유지관리 종합안전 대책 등

2) 발주기관, 설계자의 책임 및 업무

가) 설계의 목표와 추진 절차

(1) 설계자는 건설공사의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진        건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업 계획을 파악하여 최상의        계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

(2) 설계자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역 착수 시 계약에 의거 발주기관이        요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 한다.

(3) 설계자는 발주기관의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

(4) 설계자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계 용역의        각 단계별 성과품을 작성하며 그에 대해 총체적 책임을 진다.

(5) 설계는 관련 법규와 계약 조건, 발주기관과 협의된 기본설계 조건을 만족해야 한다.         만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 설계자는 발주기관에게         보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관 협의 등을 통하여 그에         대한 적절한 해결책을 모색해야 한다.

(6) 발주기관은 언제든지 설계 용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있도록         적극 협조하여야 하며, 설계자는 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에        대해 즉시 발주기관에 알려야 한다.

(7) 설계자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상황을 준수하여야 하며,         모든 설계도서에서 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

(8) 설계자는 계약을 체결할 때와 설계용역을 착수할 때, 설계도서를 완성하여 제출할        때는 반드시 대지를 방문하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생되지 않도록         하여야 한다.

(9) 설계자는 용역 종료 후 공사 진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는        하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로        설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 자신의        비용으로 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

(10) 계약의 수행 중 설계자간에 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의        불가 시에는『지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준』제14장 용역계약 일반조건        제10절 부정당업자의 제재와 당사자의 의무, 3. 분쟁의 해결”에 따르되 분쟁기간        중이라 할지라도 설계자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 안된다.

나) 공정 계획

(1) 설계자는 설계 용역의 공정에 대하여 네트워크(Net Work)공정표를 작성하여 발주기관에        제출하여 승인을 받거나 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안한다.

(2) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 발주기관이 동의한 공정 계획에 의한 업무의        이행에 책임을 진다.

(3) 최초의 공정 계획이 계약 조건에 포함되지 않았다면 발주기관과 설계자의 용역        착수 회의에서 제안되고 검토 되어져야 한다.

(4) 공정 계획은 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역 수행 과정에서도 항상 재검토되어        적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

다) 업무점검표(Check List)

(1) 설계자는 계약의 성공적인 완성을 위해 모든 업무에 대하여 검토 가능한 목록을        작성하여야 한다. 이러한 업무점검표는 업무 진행에 따라 관리되고 필요시 수정,        보완되어야 한다.

(2) 업무점검표 각 항목은 업무의 시작과 완성 날짜는 정확하여야 하고 전체 공정        계획과 일치하여야 한다.

(3) 업무점검표는 각 공정에 맞추어 공정보고 시 발주기관에 제출되고 검토ㆍ보완되어야 한다.

라) 공정보고

용역의 진도를 보여주는 공정보고는 매월 정해진 날짜에 김독관에게 제출되어야 하고,       만약 공정이 지연되면 그 사유를 명시하고 적절한 대책을 수립하여야 한다.

마) 인ㆍ허가 및 승인

용역 착수 시 인․허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성하여 감독관에게 제출함으로써       업무 범위를 명확히 하고, 필요한 경우 발주기관의 협조를 받아 필요한 도서를 작성함과        동시에 인․허가 취득에 성실히 노력하여야 한다.

바) 하도급 사항

(1) 설계자는 본 용역과업의 모든 사항에 대하여 발주기관의 사전승인 없이 일부분        이라도 타 업체에 하도급을 할 수 없다.

(2) 설계자는 하도급에 대하여 발주기관의 사전 승인을 받은 후 하도급 계약을 체결하고         계약 체결일로부터 10일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에 통지하고 관리를 받아야 한다.

·하도급 계약을 체결한 용역의 범위

·하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

·하도급 기간 및 하도급 금액 등

(3) 용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 발주기관의          장에게 보고하여야 한다.

·하도급에 관한 승인사항을 위반하거나 일괄 하도급 하는 경우

·하도급대금 지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

(4) 설계자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

·당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

· 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

(5) 설계자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을         때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한         대금을 지급하여야 한다.(하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조제3항         이를 어기거나 대금을 어음으로 지급하는 등 태만할 경우에는 발주자가 직불          할 수 있으며 이때 계약상대자는 동의하여야 한다.

(6) 책임한계

하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 설계자의 책임으로 한다.

사) 업무 연락

업무 연락은 설계자와 발주기관이 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수행되어야 하며,        용역 착수 시 설계자가 과업수행계획서에서 업무 연락의 절차, 조직, 방법 등을 체계적으로        제안하여 발주기관의 승인을 받아 시행하여야 한다.

아) 발주기관 승인

(1) 설계자는 용역 착수 시 작성하는 과업수행계획서에서 성과품 및 자료에 대한         발주기관의 승인, 검토, 자문, 자료 제출의 범위와 절차 및 기간을 제안하여 승인을        받아야 한다. 이때 발주기관의 적절한 검토 소요 기간은 설계자의 용역 수행 기간에        별도로 반영한다.

(2) 설계자는 발주기관에 의해 소집되는 업무 회의에 참석하고 성과품을 승인요청서와 함께         제출한다.

자) 대지 현황 자료

(1) 설계자의 분석 및 검토

·설계자는 성실하게 전문지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대해 조사ㆍ연구           를 해야 한다. 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 서면으로 발주기관           에 제출하여 필요한 조치를 취해야 한다.

·설계자는 대지의 현황에 대한 실사를 실시하여 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항           (인접 대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사           장애요인 등)을 조사하여 발주기관과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

·설계자는 대지 경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하 매설물, 이용 가능한          시설이나 상태, 조사 자료, 일반적 기록, 추가 정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

차) 공사비와 예산

(1) 설계자는 용역 수행 시 추정 공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의하여       적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

(2) 개산 견적과 별도로, 상세 견적은 계약서에 의하고, 이때 설계자는 설계 용역이       진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중       예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에         관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

나. 설계 진행사항

1) 착수신고서 및 기타 제출서류

가) 설계자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

(1) 착수계

(2) 착수보고서

· 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)(붙임3)

· 설계용역 예정공정표

· 용역비 내역서

· 설계용역수행 조직표

(3) 분야별 설계용역참여기술자 현황 및 관련 서류(붙임4, 붙임5)

· 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

(4) 보안각서(붙임6)

(5) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

나) 설계자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

(1) 용역 기성부분 검사원

(2) 용역 준공 기한 연기원

(3) 용역 준공 검사원

(4) 하도급 통지 또는 하도급 승인요청

(5) 기타 용역 수행에 필요한 사항

2) 과업수행계획서

가) 계약상대자는 착수일로부터 15일 이내에 아래내용이 포함된 과업수행계획서를       작성 제출하여야 하며, 발주기관은 제출된 내용이 미흡하거나 변경요인이 있을 시       계약상대자에게 수정을 요구할 수 있다.(과업수행계획서는 본 용역 계약 서류의       일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

(1) 각 관련주체(건축, 기계, 전기, 통신, 조경, 토목등)간의 업무범위와 책임한계

(2) 과업수행계획서 참여기술자명단 (붙임4) 및 참여기술자 조직표. 전문분야별         기술자중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체           등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록 작성한다.

(3) 전기분야설계는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 제1종 이상 등록자가         책임 설계하여야 한다.

(4) 정보, 통신분야설계는 정보통신공사업법에 의한 설계유자격자가 설계하여야 한다.

(5) 소방분야는 소방시설공사업법령에 의한 일반(기계 및 전기) 또는 전문소방       시설 설계업 등록자가 설계하여야 한다. 단, 제연설비는 전문소방시설 설계업       등록자 (기계)가 설계하여야 한다.

(6) 목표예산을 고려한 설계운용계획(Design to Cost)

· 발주기관이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공 시           설계변경에 의한 과다한 공사비 증액이 발생하지 않도록 계약상대자는            초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의           긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

· 본 과업내용 중 설계 지침상 친환경적 계획요소로서 자원의 효율적 활용 등           설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 소요           공사비용을 면밀하게 검토, 제출한다.

· 상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 다음 항에서           규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인           방법으로 산출하여 발주기관의 승인을 득한다.

· 부실설계 및 향후 공사비의 과도한 증액이 발생할 경우에는 관련법령에           따라 용역업자 및 용역참여기술자에 대하여 불이익을 줄 수 있다.

3) 업무협의 및 공정보고

가) 설계자는 계약 후 7일 이내 착수신고서 제출 시 발주기관과 1차 업무협의를 한다.

나) 2차 업무협의는 과업수행계획서 제출시 하고, 이후 계획설계, 중간설계, 실시  설계 단계에 따른 절차 등 업무협의를 하여야 한다. 또한 다음과 같은 경우에도 반드시 업무협의를 한다.

(1) 조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정시

(2) 기본계획 완료시

(3) 실시설계 완료시(유지관리 계획 포함)

(4) 성과품 작성 시

(5) 건설기술심의 등의 관련 심의 시

(6) 계약심사 시

(7) 공정보고시(필요시)

(8) 준공시

다) 상기 협의를 포함하여 과업수행기간 동안 발주기관과 설계자는 월 1회 이상의       업무협의를 갖는다.

4) 중간 검토

설계자는 다음과 같은 발주기관의 중간 검토에 필요한 사항을 설계 용역의 공정에 반      영하여야 한다. 설계자는 중간 검토에 필요한 제반 서류를 제출하고 “승인”절차를 거쳐 다음단계로 설계를 진행하며, 서류의 제출에 따른 비용은 설계자가 부담한다.

가) 시행시점 : 설계용역 수행 진도에 따라 2단계로 구분하여 기본계획(계획설계, 중간설계)및 실시설계의 적정성 여부를 검토

(1) 1단계 : 기본계획 완료후 (공정 50%)

(2) 2단계 : 실시설계 완료 후 최종성과품 납품전(공정 90%)

5) 계획설계

가) 용역내용

(1) 설계자는 상세한 사업범위를 규정하기 위하여 가능한 합리적으로 많은 검토를 해야 하며, 추정 공사비의 검토와 계약조건에 따라 추가적인 업무가 따를 수 있다.

(2) 사업의 명확한 범위에 대해 발주기관의 승인을 득한 후 설계자는 요구되는 수량의 도서와 추정 공사비 산출서를 제출해야 한다.

나) 제출서류

(1) 계획설계 작성방법에 따라 계획설계에 대하여 설계지침에서 정한 사항을 제출

(2) 관련법규 검토서 1부

(3) 현장조사 결과보고서 1부

(4) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

※ 협의에 따라 기본(중간)설계 제출 시 일괄 제출할 수 있다.

6) 중간(기본)설계

가) 용역내용

(1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정 ㆍ 보완 지시서에 따라 작성한다.

(2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 한다.

(3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

(4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산 등 구조계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

나) 제출서류

(1) 중간설계 작성방법에 따라 기본설계도서에 대하여 설계지침에서 정한 사항 제출

(2) 지반조사보고서 필요 부수

(3) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

7) 실시설계

가) 용역내용

설계자는 기본계획(계획설계) 및 중간설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고      려 하여 건설공사의 실시설계를 실시하여야 한다.

⑴ 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 시설물의        유지관리에 필요한 비용ㆍ인력ㆍ장비 등 유지관리방법을 제시한다.

⑵ 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 아니하도록 태풍ㆍ혹서ㆍ혹한 등으         로 인한 작업 불가 일수를 감안하여 적정한 공사 기간을 부여하여야 한다.

⑶ 기본설계와 공사비 산출서가 발주기관에 의해 승인되고 실시설계의 착수가         지시되면, 계약상대자는 발주기관의 공사계약에 요구되는 도서를 준비해야 한다.

⑷ 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주기관이         승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

⑸ 도면과 시방서는 이용자수와 행태를 고려한 공간 요구 조건을 충족시키기 위해서         필요한 모든 정보를 포함하여야 한다. 또한 주어진 범위 내에서 입찰자들의         완벽한 건설공사 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방         을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖          출 수 있도록 한다.

⑹ 설계자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로         발주기관에 제시하고 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에 도면을 수정한다.

나) 제출서류

⑴ 실시설계 작성방법에 따라 실시설계도서에 대하여 지침에서 정한 사항

(2) 종결보고서 필요 부수

(3) 설계검사원 1부(붙임7)

(4) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

다) 최종 성과품의 제출

설계자는 최종 성과품을 발주기관에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계    도서는 건축사법에 의한 ‘공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준’     [별표2]에 의한 실시설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

라) 도면의 분야별 협업 및 조정

설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 설계자가 책임을 지고 협업ㆍ조정하여야 한다.

⑴ 설계자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는       종합적인 단면 계획을 수행한다.

⑵ 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 설계자가 책임진다. 설계자는 입찰단계,       시공단계, 발주기관에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성한다.

마) 시방서

설계자는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 관계 법규 및 규정에 따른 설계기준,  공종분류체계에 맞게 작성하고 자재, 입찰절차, 공사비, 공사여건 등을 고려하여  공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정·보완하여야 하며 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성한다.

바) 공사비 산출

⑴ 설계자는 실시설계를 진행하면서 지속적으로 공사비를 검토하고 변경이 필요할 때는        발주기관에 자문 또는 승인을 받는다. 만약 공사비 한계를 초과할 경우 계약       상대자는 비용 절감을 검토하여야 하고, 공사비 범위내에서 의견을 제출하여       승인을 받아야 한다.

⑵ 설계자는 총 공사비 산출서를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

사) 업무 수행 절차

⑴ 설계자는 의문 사항이 발생 시 발주기관과 긴밀히 협의하여 해결하여야 한다.

⑵ 설계자는 업무 진행에 필요하거나 발주기관에 의해 소집되는 업무 회의에 참       석하여야 한다.

다. 업무보고 및 회의

1) 업무 보고

가) 주간 공정보고(붙임8)

주 1회 작성

단, 수시보고가 있었던 주의 주간보고는 생략 가능.

나) 월간 공정보고(붙임9)

감독관과 협의하여 매월 협의일자를 기준으로 업무수행 사항 및 예정사항을         작성하여 붙임의 양식에 의거 제출하여야 한다.

다) 수시 보고

설계용역 진행 중 문제점 발생시에는 문제점을 분석하여 발생시 마다 제출

하고, 발주기관 요청시 수급인은 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

2) 회 의

가) 설계 용역과 관련된 회의는 설계자 또는 발주기관이 필요하다고 판단할 때         항상 소집될 수 있어야 하고 회의의 목적이 분명하며 소요 시간이 가능한 짧아야         하며, 반드시 회의록을 작성하여 상호 보관하여야 한다.

나) 계획설계, 중간(기본)설계, 중간보고회, 실시설계, 최종보고회 등 설계 각 단계별         업무보고회 전에 발주기관과 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는       설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

라) 본 과업내용서에 대한 대안을 제시할 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를       제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

마) 발주기관은 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출ㆍ요구하        여  수정ㆍ보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할         수 없다.

바) 또한 회의는 진척된 공정 보고와 회의에서 제안된 모든 안건이 포함되어야 하고,       회의 소집자는 회의 3일전까지 모든 참석자에게 회의 정보를 전달하여야 한다.

3) 중간 보고회

가) 중간보고회는 계획설계 완료 후, 중간설계 완료 후 각각 15일 이내에 발주청과         장소와 일자에 대하여 협의하여 개최한다.

나) 중간보고회는 사업 책임 기술자가 계획설계 및 중간설계 내용을 토대로 설계         진행계획을 설명하여야 한다.

4) 최종 보고회

가) 최종보고회는 용역완료 20일 전에 하여야 하며 장소와 일자는 발주기관과 협의 한다.

나) 최종보고회는 사업책임기술자가 실시설계를 토대로 설계의 전반적인 내용을 설명          하여야 한다.

5) 수시 회의

가) 설계진행 시 문제점이 발생하거나 기획업무, 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시          보고에 필요한 자료를 작성ㆍ배부하여야 하며 회의 일자는 상호간 일시와               장소를 협의하여 개최한다.

나) 계획설계 과정에서 최적안이 확정되는데 있어 발주기관의 요구(회의요구            및 자료제출)에 적극적으로 협조하여 최적안이 확정되도록 한다.

라. 기타 업무

건축사법에 의한 기본업무 외 아래와 같은 업무도 본 설계용역에 포함한다.

1) 설계관련 업무

가)  건축허가 신청서 작성 이외의 업무협의 결과 이행하여야 할 절차 이행 및         관련 대리업무

나)  건물 내외부 투시도 등의 제작(발주부서에서 지정하는 2곳에 대한 투시도 제작)

다)  색채디자인 기본계획(내장재 색채의 기본계획을 설계도면에 표시)

라)  계약심사 담당부서에 공사발주를 위한 계약심사업무 협의서류 작성업무

- 설계(공사비 산출, 수량산출 등)에 대한 적정성 심사자료

2) 추가업무의 수행

녹색건축 인증, 건축물 에너지효율 등급인증, 장애물 없는 생활환경인증(BF), 제로에너지건축 인증, 신재생 에너지 설비 등의 업무수행

3) 설계VE 업무 협조

가) 설계자는 설계의 경제성 등 검토(설계VE)에 관한 업무에 협조하여야 한다.

나) 설계자는 발주청에서 별도의 용역으로 시행할 설계VE 진행 과정에 참여하여‘설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침((국토교통부 고시 제2018-244호) 제10조’에서 정한 자료를 제공하여야 하며, 제15조에 따라 채택된 제안은 설계에 반영하여 수정설계를 하고 설계반영 결과를 동 지침 별지 제11호 서식에 따라 작성하여 설계 보고서에 포함시키고 이를 발주청에 제출하여야 한다.

Ⅲ. 기술지침

가. 일반사항

1) 주어진 해당 예정공사비 내에서 건축비를 산정하되, 공사 예산 범위 내에서 실현 가능한 설계안을 도출한다.

2) 사업수행과정에서 법령 등에 의거 당연히 시행하여야 하는 업무는 본 과업내용서에   명시되지 않은 사항이라도 포함된 것으로 보며, 관련법에 적합하고 필요한      행정적‧법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 한다.

3) 시설 이용계획의 다양성을 고려하여 노인, 장애인등의 노약자, 일반시민 등 지역주민이 함께 시설을 이용할 수 있는 창의적이고 실용적인 공간을 구성하여야 한다.

4) 건축물의 획일화된 이미지를 탈피하여 사업부지 주변 도시경관과 조화를 이루도록 지형적, 위치적 특성을 감안한 조형성과 예술성 있는 디지안을 통한 창의적이고 독창적인 건축물을 계획한다.

5) 제출된 설계는 건축법, 국토의계획및이용에관한 법률, 주차장법, 군포시 건축조례, 도시계획조례, 군포시 주차장 설치 및 관리조례, 산본 지구단위계획지침 등 기타 관련 법령에 저촉됨이 없어야 하며, 별도의 시설기준이 있는 경우에는 그 시설기준에 적합하여야 한다.

6) 내진설계가 되도록 하고 재해 및 재난시 안전사고에 대비할 수 있도록     설계한다.

7) 가로경관 및 정면성을 고려하고 주변 환경과 조화로운 외관계획을 구성하고   도시이미지와 상징적 역할을 할 수 있도록 건물의 상징성 및 조형미가     나타나도록 한다.

8) 공사비 및 공사기간을 절약 할 수 있는 자재 및 안전하고 쾌적한 환경조성을   위한 친환경 내장재 사용시공법의 선택과 에너지절약 대책을 강구하며 공   간의 기능성과 공간활용의 합리성을 고려하여 설계한다.

9) 장애물이 없는 생활환경(BF) 인증, 건축물에너지효율(1등급 이상) 인증, 녹색건축물(일반등급 이상) 인증, 제로에너지 건축인증 예비인증을 획득한다.

10) 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률에 따른 빗물이용시설을 설계에     반영하여야 하며, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에    의거 신·재생에너지의 공급의무 비율 기준 이상으로 설치 계획에 포함    하여 계획하고, 도면에 표기하여야 한다.

11) 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」을 설계에 반영한다.

나. 건축분야

❍  배치 및 동선계획

1) 시설 이용자 및 용도 특성에 맞게 출입동선을 고려하고 소음·진동 발생 등으로 인하여 상호 간섭되지 않도록 한다.

2) 부곡동 종합사회복지관 이용자의 외부공간 이용행태를 고려하여 각종 행사      및 주민 커뮤니티 활성화, 비상시 대피를 고려한 적정 공간 등을 백일홍     어린이공원과 연계하여 확장 가능한 외부 공간을 계획한다.

(교원식 보도 설치 검토)

3) 이용자에게 쾌적한 녹지 환경을 제공하고 내·외부 공간이 유기적     으로 연계 될 수 있도록 적절한 휴게 공간 및 녹지를 계획한다.

4) 주변 건물 및 부지 조건 등의 여건을 고려한 배치 및 외부공간계획이    수립 될 수 있도록 창조적인 아이디어를 제시하여야 한다.

5) 각 시설물의 예산·건축면적·연면적·적정 규모의 외부공간 및       향후 관리·운영 편의 등을 종합적으로 고려하고 향후 상황변화에     따라 증축을 고려하여 설계한다.

6) 주변 교통 현황을 고려하여 혼란을 최소화할 수 있는 차량 진·출입    동선을 계획하고 보행자 동선을 우선적으로 고려한다.

7) 화재 비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용      동선을 계획하고, 부지 내 진출입 위치 및 동선 계획 시 전체 시설의 보안   및 통제를 고려하여 합리적으로 계획한다.

8) 주차대수는 관계법령을 준수하되 1층 필로티 활용한 주차계획, 주차 수요를 고려하여 최대한 여유있게 계획한다.

9) 공공디자인 설계시 성인지적 도시공간 전문가의 참여를 권장한다.

10) 남녀 성별고정관념이 담긴 이미지는 지양한다.

11) 유모차, 휠체어가 쉽게 이동할 수 있도록 보행동선을 완만히 조성한다.

12) 편의시설 설치 시 여성, 장애인, 아동의 편의를 고려하여 여성화장실 대변기수, 계단, 안전손잡이 설치 등에 신장을 고려하여야 한다.

❍  평면계획

1) 건축 연면적은 제시한 면적에서 ±5％이내로 하여야 한다.

2)【부곡동 종합사회복지관 세부시설(안)】을 준수하여 계획하여야 한다.(단, 향후 기본 및 실시설계용역시 발주청의 필요에 따라 협의하여 변경 가능)

3) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 경감 등 경제성을      고려한 설계를 한다.

4) 추후 시설운영에 따라 필요 시 증축 내지 실별 면적·용도 등의 변경이 가능      하도록 계획한다.

5) 실의 형태는 실의 용도에 적합해야 하며 에너지 절약, 채광 및 입주자 선호도를      고려하여 계획한다.

6) 어린이 활동공간의 설계시 「환경보건법」, 동법시행령 ‘[별표2] 어린이    활동공간에 대한 환경안전관리기준을 준수하여 설계에 반영하여야 하며,   프로그램실은 효율적으로 활용될 수 있도록 개별 실간의 통합 및        분할 사용 등을 고려하여 계획한다.

7) 각각의 실별 면적 배분을 근거로 호실별 면적표를 작성하여 제출한다.

❍  입면 및 단면계획

1) 건축물은 과도한 장식과 공사비의 증가를 가져올 수 있는 불필요한 입면재료     사용을 배제하고, 창의적인 디자인과 실용적인 공간구성을 통하여 독창적이며     특색 있고 예술성, 조형성 및 통합의 상징성을 최대한 부각시켜 설계되어야 한다.

2) 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정감 있는 입면을 계획하고 자연채광     및 환기 등 에너지 효율을 극대화 할 수 있도록 계획한다.

3) 창호는 에너지 절감 및 방음, 방범, 기밀성을 충분히 확보하고 적절한 조망을    유지하며, 에너지 손실을 절감할 수 있도록 계획한다.

4) 심사용 도판 및 설계도면에 표현된 입면도에 주요 마감재료를 표현한다.

5) 조닝 구분을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호 유기적    으로 연결되도록 하며, 층간 소음을 고려한다.

6) 각 시설별 세부시설(안)을 참고하여 실별 용도, 면적, 기능, 특성에 따라 적정한      층별 실 배치 및 층고·천장고를 계획하고, 그에 따라 지하층의 필요 여부를     포함한 층수 및 건축물 높이를 계획토록 한다.

❍ 주차계획

1) 주차장은 진ㆍ출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 계획한다.

2) 보도와 차도 및 주차장계획은 이용 및 안전이 우선되어야 한다.

3) 주차장에서 부지 내 각 시설로의 접근 효율성을 고려한 계획을 한다.

❍ 방재계획

시설물 이용자의 특성을 고려하여 재해시에 방재활동의 중심이 될 시설물인 경우에는    방재 활동을 위하여 필요한 공간확보를 고려한다.

1) 내진 안전성의 확보(관계 법령 및 지침에 따라 필요시)

가) 강진 발생에 대비한 내진설계를 하여 지진 등의 재해발생시 건축물의 안전성을 확보

나) 관리자들은 지진 등의 재해로부터 방문객 등 시설이용자의 생명 및 재산의       보호를 도모해 2차 재해를 방지함은 물론 지역 주민들의 대피 공간으로서의 기능을 수행

다) 건축물로서의 내진 안전 성능은 건축 구조(구조체), 건축 설비(전기설비, 기계설비)        및 건축 비(非)구조 부재(구조체를 보호하거나 건축물의 공간, 환경을 구성하는        부위와 그 구성 요소로서 외벽 및 그 마감재, 창 등의 개구부, 칸막이 및 내장재,        천정 및 바닥재, 가구 및 사무기기 등)가 종합적으로 조화를 이루도록 구성

2) 화재에 대한 안전성 확보

가) 시설의 특성을 고려하여 인명피해 방지를 위한 경보시설과 피난유도시설이 고려되어야 하고, 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각 실 및 기능단위 특성에 적합한 소방 설비를 계획하여야 한다.

나) 천정 및 벽체 등의 내장은 불연 재료를 사용하는 것을 원칙으로 하고 피난경로는       간명하게 한다.

다. 토목분야

❍ 일반사항

부지 조성은 기존의 지형여건, 지반조건을 고려한 경제적인 토공 계획이 되도록 노력하여야 하며, 지하공간을 최대한 자연 채광이 반영되도록 하여야한다. 또한 건축물의 계획고는 가능한 성토 및 절토량을 최소화할 수 있도록 계획한다.

지반조사 및 지하구조물 조사를 통하여 발생할 수 있는 위험요서들을 사전에 방지하도록 한다. 건축법 제48조에 따라 구조 안전 및 내진확인서를 제출하고 지반종류 파악을 위해서 지반조사 시 전단파 속도를 측정토록 한다.

3) 본 공사 계획에 적용되는 모든 표고는 도로의 표고를 기본 측점으로 한다.

4) 설계에 임하기 전에 설계자는 반드시 현장 답사를 실시하여 현장의 지형, 지역적인

여건 및 장래계획, 배수상황 등 제반 주변 사항을 조사하여 경계를 확정하고

조사 내용은 기본설계에 반영하여야 한다.

❍ 지반 조사

1) 일반사항

가) 지반조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, NX규격 등)를        작성하여 발주청의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다. 또한 지반조사는        계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여         지반조사 위치를 정한다.

나) 지반조사는 계획서에 따라 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치        별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은        계획서에 따라 시험을 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는        현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지         시행하는 것을 원칙으로 한다.(한국건설기술연구원 지반조사 기준 참고)

다) 설계자는 현장 지반조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여         경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주청의 검토를         받은 후 인쇄하여야 한다.

2) 조사방법

가) 현장 원위치 시험과 자연시료채취 등에 있어서 필요시는 감독자의 승인을          득한 후 시추공경, 시추방법 등을 변경 시행한다.

나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고        공사기간의 중∙장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 감독자의         승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

다) 시추를 완료한 시추공은 매몰되지 않게 PVC관을 설치하여 공사 중 지하수위         측정이 가능하도록 하고, 별도의 이용계획이 없는 시추공은 반드시 시멘트풀로         그라우팅을 실시하여 폐쇄시키고 감독자의 확인을 받는다.

라) 자연시료채취

·연약 점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를           채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀          봉하고 시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

마) 지하수위 측정

·시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각           측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

·지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로           측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.

바) 표준관입시험

·표준관입시험은 KSF 2318 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

·시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일 층이라도 1.5m 깊이마다 1회씩  실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

사) 토질 및 암석시험

·표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대하여             다음과 같은 시험은 KSF 규정에 의거하여 실시한다.

아) 시료상자 정리

·상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자          내에서 토사나 암석 코아를 채취심도 별로 구분 보관하여야 하며, 시료상자는          천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은          코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며, 암석의 색조와          조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

·암석 코아가 아닌 슬라임 만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙시료와 같은           요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

자) 본 과업내용에 명기되지 않는 사항은 토질 및 암석시험규정, 한국산업규격          및 기타 관련규정에 따라 시행하여야 한다.

3) 지반조사 성과품

가) 지반조사보고서 요구 부수 (조사 야장, 토질조사 자료, 조사현황 사진첩 등 일체 포함)

나) 시료보관 상자 및 시료

다) 보고서는 A4 규격으로 좌철(무선무사철) 및 양면 인쇄하여야 하며 표지는 레쟈크지         이상이며 본문은 백상지로 하고 시추전경 등 첨부되는 사진은 칼라를 사용한다.

❍ 토공 및 흙막이 설계

1) 토공은 가급적 절ㆍ성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고         부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록        계획하여야 하며 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

2) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및    실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

3) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에     가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성(Trafficability)을 확보토록 한다.

4) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되         지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해, 구조물 및 현장여건을 고려하여        적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

5) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지반조사 결과 또는 관련        전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용근거를 첨부하여야 한다.

6) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 계측방법,         설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

7) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시         발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

8) 건축물 부분 터파기 공사의 설계와 내역은 토목공종에서 일괄하여 설계 되도록 하여야한다.

❍ 하수도계획

1) 하수도계획은 환경부 제정 하수도시설기준과 하수분야업무 처리지침 등 관련       규정에 의하여 설계한다.

2) 부지 내 우수 및 오수관로는 분류식으로 설계하여야 한다.

3) 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

4) 강우강도 적용은 각종 규정 및 지침에 따라 적용한다.

5) 관의 규격은 우수량 산정결과를 토대로 유량과 비례하여 하부로 내려갈수록        점차 크게 설계한다.

6) 하수관의 유속은 1.0∼1.8m/sec내로 계획하되 부득이한 경우 0.8∼3.0m/sec내로      계획한다. 다만 부득이하게 3.0m /sec를 초과하는 경우 관 손상방지를 위한 대책을      수립하여 설계에 반영하여야 한다.

7) 우ㆍ오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화        할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

8) 맨홀 및 연결관 설치기준

가) 맨홀 설치위치는 하수도시설기준에 준하며, 부지내 최종 하부에는 집수 맨홀을         설치한 후 기존관로에 접속하여야 한다.

나) 빗물받이에서 우수본관까지 연결되는 연결관은 충분한 용량으로 시공성 및        경제성 등이 뛰어난 배수용 관으로 설계하여야 한다.

다) 맨홀은 하수관로의 기점, 합류점, 구배 변환점, 관경 변화점에는 반드시 설치         하여야 한다.

라) 맨홀뚜껑은 주철뚜껑으로 K.S제품을 사용하여야 하며, 차도부, 녹지부와 보도부를         세분화하여 계획하여야 한다.

마) 연결관 연결시 수밀성이 양호한 단지관(새들 포함)을 사용하여 연결하도록        설계에 반영하고, 연결관 접합을 위한 천공시에는 반드시 천공기를 사용하도록       공사시방서 등에 명기한다. 맨홀은 청소 및 유지관리에 편리하도록 설계하여야 한다.

9) 우수받이 및 집수정, 오수받이

가) 규격은 소정의 강도를 가진 제품으로 관의 연결방향, 관경 및 배수 경사를         감안한 유출구의 높이를 현장여건과 맞게 검토하여 설계하여야 한다.

나) 우수받이 및 집수정은 이토실의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

다) 오수받이 바닥은 인버트의 기능이 발휘될 수 있도록 제작 및 시공되어야 한다.

10) 부지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을       설계하여야 하며, 우수처리 계획시 현황을 고려 외부유역을 포함하여야 한다.

11) 관로계획 시 모든 지질에 대하여 지반조건을 고려하여 장기침하에 대비한 관        기초를 계획하여야 한다.

12) 빗물은 하수관으로 유도하기 이전에 가능한 많이 지하(지반)로 침투되도록 침투․       저류시설(우수 침투형 맨홀 등)의 설치 또는 오목형 지형 조성 방안을 검토 제시하고       설계에 반영하여야 한다.
13) 장기적인 수원 확보를 위해 중수도 시설을 필수적으로 포함하여 설계에       반영하여야 한다.

❍ 우 ㆍ 오수설계

1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록

하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

2) 배수시설 계획은 인접 우ㆍ오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구

의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

3) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소

관경이 150㎜ 이상이 되도록 한다.

4) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을 설치하여       낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

5) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로       하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

6) 관거는 직선으로 부설하고 굴곡부는 예각 및 직각으로의 접합을 피하며 침하되지        않도록 설계한다.

7) 관로시험 CCTV 및 공기압시험을 하도록 시방서 등에 명기하여야 한다.

❍ 도로 및 포장설계

1) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와

유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

2) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계하여야 한다.

3) 도로, 주차장 등 포장두께는 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을       결정하되 동결심도를 고려한 두께 이상으로 설치하여야 한다.

4) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어       우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

❍ 기 타

1) 부지 경계부근은 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

2) 사토장(또는 토취장)의 철저한 조사 및 그 결과를 내역에 반영한다.

3) 토량이동계획도를 작성한다.

라. 구조분야

1) 기본사항

가) 구조설계는 합리적인 구조계획과 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이          안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지         않도록 하여야 한다.

나) 특수공법을 택할 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를         제시하여야 한다.

다) 구조물의 균열발생을 최소화 할 수 있도록  계획하여야 하며, 지진이나 신축 등         으로 인한 유해한 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

라) 구조형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여 정하여야 한다.

마) 구조의 안전성능은 법령 및 정부 등에서 정한 설계기준을 만족하여야 한다.

바) 건물의 구조방식은 건물의 기능을 고려하여 설계자가 제안하도록 한다.

사) 구조설계는 대한건축학회에서 규정한  건축구조기준 자격이 있는 책임기술자가 하여야 한다.

2) 적용법규 및 관련기준

가) 설계규준의 적용에 있어 단일규준(같은 계열의 적용규준 포함)을 일관성 있게 적용         하여야 한다.

나) 적용규준 및 규칙은 최신의 정부제정 기준이 우선한다.

3) 구조계획

가) 모든 구조부재의 배치는 합리적으로 한다.

나) 구조부재의 배치 및 구조형식은 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그          내력을 확인할 수 있어야 한다.

다) 가급적 2차 응력이 발생하지 않는 구조로 한다.

라) 처짐 등의 변형 및 진동을 최소화 시킬 수 있는 구조로 한다.

마) 안전성 확보를 위한 기준을 세워 설계에 반영한다.

바) 비정형구조물의 경우 응력 집중현상 등을 피할 수 있는 구조방식을 채택 또는           이를 보완하는 방법을 제시하여야 한다.

사) 각 구조부의 치수는 구조계산에 의하여 적정성이 확인된 경우가 아니면 최소치수         이상으로 한다.

아) 옥상조경을 할 경우 이에 대한 구조적 안전성을 반영한 구조로 한다.

4) 구조설계

가) 모든 부재의 설계에 적용된 해당규준을 명시한다.

나) 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 규준 및 지침을 명시한다.

다) 설계기준의 적용에 있어서 단일기준(같은 계열의 참고규준 포함)을 일관성 있게           적용하도록 한다.

라) 설계하중

(1) 건축구조기준(대한건축학회)에 준하여 적용한다.

(2) 경량 칸막이 벽은 위치변경을 예상하여 그 위치가 어디로 변경되더라도 구조상            안전하도록 하중계상을 한다.

(3) 시공 중 하중이 과다한 경우에는 이에 대한 고려도 하도록 한다.

(4) 구조물 상부에 흙을 덮어 조경을 하는 부위는 그 중량(토심 900㎜이상)을 감안한다.

(5) 옥상 녹화계획의 유무에 따라 지붕슬래브의 조경녹화에 따른 하중 증가를 미리 고려한다.

(6) 지상 및 지하주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 활하중을 고려한 영향선을            파악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생하지 않도록 해석, 설계한다.

(가) 고정하중 : 구조재 및 마감재 등의 실재중량을 계산하여 적용한다.

(나) 활하중

·각 건물의 기능, 소요실 별 제반특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때에는              증가시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치되는 실은 별도 계산한다.

·기계설비의 하중 : 기계설비(공조실, 기계실, 전기실)의 하중조건에 따라 설계한다.

·지하구조물의 상부에 외부주차장인 경우에는 활하중 12kN/㎡ 이상의 등분포하중으로              설계하되 향후 예상되는 이용차량을 고려하여 활하중을 적용한다.

(다) 풍하중

·건축구조기준(대한건축학회)에 따라 해당지역의 설계기본풍속 및 노풍도를 적용              하되 구조물 형상에 따른 풍압산정은 규칙에 따른다.

·건물의 모양이 복잡하고 주위 건물 혹은 환경에 따라 바람의 영향에 대한                정확한 예측이 어려울 경우 풍동실험 및 적설실험을 할 수 있다.

(라) 지진하중

·건축구조기준(대한건축학회)에 따르며, 비정형 구조물에 대하여는 반드시

동적 해석을 하여야 한다.

·지진하중 산정시 전단파속도를 감안하여 지반종류를 판별하여야 한다.

(마) 수압

·지표면 하부의 구조설계에는 지역 또는 부지 내 위치, 토층여건과 강우 시 지하수위             상승 등에 의한 부력을 감안하여야 하며, 공사 도중의 부당여부를 포함하여              제반 사항을 검토하고 그에 따른 적절한 조치가 되도록 한다.

(바) 온도하중 : 구조내력 상 필요한 경우 설계에 반영한다.

마) 기초설계

(1) 건축구조기준(대한건축학회)에 의함

(2) 최종 배치도에 지반조사 위치를 표기하고 기초형식을 표기한다.

(3) 건축구조 단면도에 토질 주상도를 표기하여 건설계획고, 구조가 기초와 지반과의            상대적 위치를 파악할 수 있도록 한다.

(4) 기초형식은 건축구조기술사 또는 토질ㆍ기초기술사의 판단에 따른다.

바) 구조해석

(1) 구조해석용 프로그램은 보편적으로 공인된 것을 사용하고, 그렇지 못한 프로그램을           사용하는 경우에는 해석내용이 보편적인 프로그램과 비교하여 차이가 없음을             증명하는 자료를 첨부한다.

(2) 기둥이나 내력벽의 축하중 산정에 있어서는 고정하중의 각 부위별로 산출근거를           명시하여야 하며, 활하중은 층별로 저감시킬 수 있다.

(3) 슬래브 또는 벽의 개구부, 피로티 등 동일 건물 내에서 강성이 크게 변하는              부분은 응력집중을 정밀 검토하여 설계에 반영한다.

(4) 입력 자료는 구조해석 모델 약도와 같이 제시하여야 하고, 출력 자료는 부재별,           층별로 선후관계를 명확히 파악할 수 있도록 정리 제시한다.

사) 부재단면 설계

(1) 부재단면은 철근이음 및 정착이 집중되는 부위에서도 콘크리트의 부어넣기가            용이한 크기 이상이어야 한다.

(2) 유효단면의 춤(d)은 철근의 피복두께를 건축공사 표준공사시방서를 기준으로            하여 산출하여야 한다.

(3) 부재단면(또는 철근량)은 실용도상의 변경, 예상치 못한 2차 응력발생시, 시공           오차 등을 감안하여 단면계산에서 산출된 것보다 할증을 고려하여야 한다.

5) 구조계산서의 작성요령

가) 구조계산서는 그 내용구성과 선후관계가 분명하게 작성하여 이해하기 쉽게 한다.

나) 구조계산서 작성

(1) 일반사항

(2) 구조개요

(3) 구조설계기준(적용기준 명시)

(4) 구조설계기준(SYSTEM)

(5) 구조재료의 재질 및 강도

(6) 부재단면 요약

(7) 구조골조 평면 및 주단면도

(8) 설계하중 산정

(9) 구조해석

(10) 부재설계

(11) 기초지반 지내력 검토

(12) 내진, 내풍설계 검토

마. 조경분야

1) 일반지침

가) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고 건물, 주차장등과

연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

나) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

다) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간,

수경공간, 운동공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

라) 주요자재에 대한 사용성 등을 검토하여 비교ㆍ검토하여 적절한 자재를 선정 설계          반영하여야 한다.

마) 부지의 특성과 토양 및 주변 수종 등을 감안하여 설계에 반영하여야 하며 조경은         상호 이질감이 없도록 건물의 성격에 조화되도록 한다.

바) 미기후에 적합하고 꽃 수피등 계절별로 수목의 특징을 감상할 수 있는 수목구성         으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

사) 병충해, 전정, 동절기 보온 등 유지관리가 용이한 수목을 선정 한다.

아) 조경관련 시설물 등에 대하여는 위치, 규모, 재료, 수량, 내구성, 질감, 구조 등을         충분히 고려하여 설계를 하고 이용자의 휴식 등을 위한 인공구조물을(주변 경관과         연계하여) 설치하되, 주변지형, 단지 내 지형, 시설물 등과 조화를 이루도록 한다.

자) 필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요

한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다 . 이 경우 건축물의 하중         에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 검토         하여야 한다.

2) 현황 조사 분석

가) 자료조사

(1) 국내 ㆍ 외 우수사례를 조사 분석하고 선진기술 또는 모범사례가 있는 경우 등을 사례 분석하여 설계에 반영한다.

(2) 관련 법규를 면밀히 검토하여 필요한 사항을 설계에 반영한다.

나) 현장조사 및 실측

(1) 식생ㆍ생물상ㆍ토양 등을 조사하여 식재 설계방향을 설정한다.

(2) 구조물 및 관련되는 지장물(지상, 지하 매설물)을 조사하고 안정성을 검토한다.

다) 표토 및 지장수목조사

(1) 계약상대자는 식재지반조성을 위한 표토를 미리 조경기술자와 협의하여 표토의           수집과 보관을 위한 계획을 한다.

(2) 수목조사는 조경설계 면허를 보유한 업체의 조경관련 자격을 가진 자로 하여금           현장실사를 통해 정확하고 구체적으로 이루어져야 한다.

(3) 조사대상의 수목은 공사구역내 지장수목뿐만 아니라 공사용 작업로, 자재 적치           및 작업장, 장비진입로 등의 수목까지 포함하여 조사한다.

(4) 수목조사대상은 녹지대, 가로수, 띠녹지에 있는 수목 및 초화류로서 교목, 관목,           초화류를 수종별, 규격별로 자세히 조사한다.

(5) 녹지대 및 띠녹지내 조형물, 조경석 등 조경시설물도 함께 조사한다.

(6) 본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원문제 등을 조사 검토한다.

3) 공종별 상세설계

가) 배수시설 설계

(1) 녹지구역 내에 빗물이 고이지 않도록 설계하여야 하며 필요시 연결배수시설을           설계에 반영한다.

(2) 표면배수로는 잔디 등 친환경 소재 활용을 검토한다.

(3) 옥상설계를 할 경우  특별한 사유가 없는 한 반영하고 설계 시 수목의 생장 및           건축의 안전도 등을 고려한 배수계획과 급수시설의 설치 등을 강구해야 한다.

(4) 가급적 많은 양의 빗물을 저류, 침투, 활용할 수 있도록 오목형 지형 및 정원조성,           식생 배수로 설치 등의 방법으로 설계 및 시공되도록 한다.

(5) 배수시설은 최대한 자연지반에 빗물이 많이 스며들고 머무룰 수 있게(표면에             빗물의 고임이 없이)계획하여야 한다.

나) 옥상조경

(1) 필요에 의하여 옥상조경 설계 시 수목의 생장 및 건물의 안전도 등을 고려한 배           수계획을 강구하여야 하며 급배수시설의 설치를 적극 검토하여 시행한다.

(2) 옥상녹화는 이용자 및 거주자가 휴식공간 등으로 이용 가능한 방향으로 계획하여야 한다.

(3) 단열층, 방수층, 방근층,보호층, 배수층, 토양필터층, 토양층, 식생층의 순서로

구성되도록 한다.

(4) 배수불량을 막기하여 녹화부 가장자리에 배수로를 별도로 고려하고 상시 관리가           가능하도록 덮개가 있는 배수 점검구를 설치한다.

(5) 식재기반은 건축물의 고정하중 및 이용자들의 이동하중, 습지와 같은 서식지 물의           짐무게를 고려하여 계획한다.

(6) 바람에 의해 수목이나 초화류 등의 쓰러짐과 지상으로 떨어짐을 방지하기 위하여            안전난간(1.2미터 이상) 또는 안전 구조물을 계획하여야 한다.

(7) 용역시행 중 자문이 필요한 경우 조경 전문가의 의견을 듣고 시행하여야 한다.

(8) 공종별 물량과 공사비를 산정하여야 한다.

(9) 방수 등은 타 공종을 고려한 적정한 방안을 강구한다.

(10) 본 과업내용과 유사한 국내ㆍ외 사례를 조사하여 모범적인 사항은 설계에 반영한다.

(11) 효율적인 유지관리에 필요한 비용, 인력 등을 산출한 계획서를 작성하여 제출한다.

바. 기계설비

1) 일반사항

가) 기본계획을 반영하여 운영에 적합한 최상의 기계설비 계획을 수립하여야 한다.

나) 설계 착수 전 본 건물 특성 및 운영 시스템에 대하여 면밀한 검토를 한 후 이에         따른 각종 시스템(공조, 위생, 환기, 소방, 신재생에너지, 자동제어 등)의 최근 도입        되는 방식에 대해 경제성 등을 포함한 장‧단점을 비교 검토하여 최고의 방식을 반영하도록 한다.

다) 설계 착수 전 기존 운영 중인 기계설비를 검토하여 원활한 운영이 되도록 설계에        반영하고, 도시가스, 상수도, 하수도 등의 항목에 대해서는 사용량, 사용시기 인입        위치 등에 대하여 사전에 유관기관과 협의 후 확인하여야 하며 주변의 도시기반시설을        파악하여 계획하도록 한다.

라) 시공방법, 자재 및 장비류에 대한 시방서를 작성하고 특별한 공정이나 특수장비에        대해서는 반드시 전문시방서를 작성하여야 한다.

2) 기본방향

기계설비 설계 관련 신기술 도입 및 친환경을 고려한 설계로 합리적인 시설이 되도록 하며, 본 계획서 및 정부의 에너지 수급정책과 에너지 절약, 환경오염방지 등을 적극 수용하도록 하여야 한다.

가) 시설 용도에 적합한 쾌적한 실내환경 계획 수립

(1) 냉ㆍ난방 시스템 계획

(2) 실 특성을 고려한 환기방식 선정

(3) 소음 및 진동의 최소화 계획

나) 경제적이며 효율적인 설비계획

(1) 에너지 분석에 의한 경제적인 시스템 선정

(2) 효율적인 기기 운용 시스템 계획

(3) 부하산정의 적정성

(4) 효율성 및 경제성을 고려한 설비계획과 대체에너지(지열)의 이용 검토

다) 환경친화적 설비

(1) 주변 환경오염 방지

(2) 자연조건(자연 채광 및 환기 등)을 적절히 이용

(3) 친환경설비계획(저탄소 배출에너지 사용, 친환경신기술 이용 등)에 대한 내용을           구체적으로 검토하여 설계에 반영

라) 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

(1) 장비 및 배관보수 공간의 충분한 확보

(2) 시스템의 단순화로 유지관리 및 점검이 용이

(3) 신뢰성 높은 장비 선정 및 설치

(4) 주요 설비에 대한 LCC 분석, 유지보수, 에너지절약 설계기준을 고려한 경제성 검토

마) 주요설비에 대한 Life Cycle Cost, 유지보수, 장래의 설비 증설, 에너지절약설계기준을         고려한 경제성 검토 등을 명시하여 설계 초기단계에서 부터 건축기계설비 경제성에         대한 검토가 이루어져야 한다.

3) 설계기준

가) 일반사항

(1) 각 실의 용도에 적합한 설비를 하여 쾌적성, 위생성, 경제성, 유지 관리성 등이   확보되도록 한다.

(2) 효율적인 설비 설계로 최고의 기능발휘와 경제성이 조화를 이룰 수 있어야 한다.

(3) 기계설비시스템은 가능한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, A/S의 원활성,          조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다.

(4) 초기투자비 및 운전비를 고려한 계획한다.

(5) 추후 확장성 및 변경 대응성을 고려한 시스템을 선정한다.

(6) 건축물의 지속가능성 제고 차원에서 자연채광 및 자연통풍이 가능한 실로          최대한 배치하고 에너지절약 및 유지관리를 고려한 창호계획을 해야 한다.

(7) 기계실, 공조실 공간을 충분히 확보하고, 층별 및 사용처 개소마다 점검구를 충분히          설치하여 유지, 보수 등에 용이하도록 한다.

(8) 기계실 및 전기실은 동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음 등을 고려하여 설계하여야 한다.

(9) 기계실 및 열원기기 등은 각 건물에 분리하여 설치하며, 자동제어 설비는 기계,          전기, 통신, 소방, 엘리베이터 등 통합 감시제어가 완벽하게 이루어질 수 있도록          통합관리시스템을 운영한다.

나) 건축물 각 부위의 열관류율 기준

건축물의 각 부위의 열관류율 기준은 건축물의 에너지절약설계기준, 고효율 에너지       기자재 보급촉진에 관한 규정을 적용한다.

다) 배관자재의 사용기준

배관 재질은 관내 흐르는 유체의 성질에 적합한 것으로

(1) KS규격 및 동등 이상의 배관 선정

(2) 공급된 실적이 많아 사용 및 유지관리에 어려움이 없는 것

(3) 내식성 및 내구성이 좋은 것

(4) 내산성 및 내약품성이 우수한 재질

(5) 유지보수용 자재의 확보가 용이한 것을 적용한다.

라) 위생설비 설계기준

(1) 절수형 세정방식을 채택하도록 한다.

(2) 노약자, 어린이, 장애인을 위한 위생설비 계획

(3) BF(장애물없는 생활환경인증) 기준에 적합한 설계를 하여야 한다.

마) 오수정화조 설비는 관련법규 및 조례에 적합하도록 설치한다.

4) 세부 설계지침

가) 열원설비

(1) 열원 공급은 지역난방, 도시가스, 전력, 신ㆍ재생에너지 등을 종합적으로 검토하여             유지관리가 용이하고 친환경적이며, 에너지 절약적이고 안정적인 열원공급방식이         되도록 하며, 특히 지열설비 선정시에는 관련법령에 의한 기술검토확인증 등을 발급         받아야 한다.

(2) 열원설비 선정에 대한 경제성 분석을 하여 최적의 설비시스템이 되도록 하며 분석         내용을 제시하도록 한다.

(3) 열원기기는 부분 부하운전 및 전부하 운전시 효율이 좋고 비례제어가 가능하도록         선정하고, 고효율 기기를 채택하는 등 시스템의 에너지 효율을 향상시킬 수 있어야 한다.

(4) 냉동기, 열교환기, 보일러, 냉온수기, 펌프, 송풍기 등은 부하조건에 따라 최고의          효율을 유지할 수 있도록 대수분할 또는 비례 제어운전이 되도록 한다.

(5) 시스템의 단순화, 통합화로 유지관리가 용이하고 경제적이며 효율이 좋은 시스템을 적용한다.

(6) 장비는 효율을 높이고 유지관리가 용이하도록 배치하며 중량 기기의 반입과 수리         등을 위한 반입구 및 동선을 위한 공간이 충분하여야 한다.

(7) 보일러 등 열원 장비는 특성에 맞는 효율적인 방법을 경제성 분석 등을 비교            검토하여 선정한다.

(8) 소음과 진동의 발생 원인이 되는 시설(장비, 닥트, 배관 등)에 대해서는 효과적이고         적절한 방음, 방진 예방 대책을 강구하여야 한다.

나) 냉ㆍ난방 및 공기조화설비

(1) 장비 설치시 실 용도에 적합한  냉ㆍ난방설비로 검토ㆍ계획한다.(열원과 연계하여 검토계획)

(2) 공기조화 방식은 시설(실)별 부하특성, 온도, 습도, 기류, 풍량, 청정도 등을 고려하여          각 용도별로 유지관리, 에너지절약 면에서 최적의 공조방식을 채택한다.

(3) 용도별, 시간대별에 따라 조닝(Zoning)을 분리하여 적합한 공조방식을 채택하며,          다음과 같은 사항을 면밀히 검토하여 적절한 조닝으로 에너지 절약을 도모하여야 한다.

·실내의 온습도 조건이 타 구획과 크게 다른 곳

·사용 시간대가 타 구획과 크게 다른 곳

(4) 댐퍼류는 기밀성이 좋고 제어특성이 좋은 댐퍼를 선정하도록 하며, 적절한 풍량          조절을 위하여 덕트의 분기구에는 풍량 조절용 댐퍼를 설치하도록 한다.

(5) 냉풍이 통과하는 덕트는 완전히 방습을 행하여 외부로부터 투습된 습기에 의하여          단열효과가 저하되지 않도록 고려한다.

(6) 에너지를 절약할 수 있는 범위 내에서 냉ㆍ난방 기준 온ㆍ습도를 설정하고 중앙         제어실, 대기실 등은 기준온도 및 습도가 최적의 상태를 유지할 수 있도록 계획한다.

(7) 구조체 내부 결로 방지 대책을 강구한다.

(8) 배기량이 많은 공조 계통에는 배열회수를 위한 전열 및 현열교환기를 비교ㆍ검토          후 적용하여 에너지를 절감한다.

(9) 수용인원에 의한 충분한 검토와 기기의 발열 등을 고려하여 공조설비 용량을 산정 적용           하여야 한다

(10) 배관은 절연, 소음절감 방안, 내진 등을 충분히 감안하고, 재질, 이음, 설치,지지          방법, 보온 등에 대하여는 유체의 흐름이 원활하면서도 최대의 효율을 내도록 한다.

(11) 소음ㆍ진동의 발생원이 되는 공조설비ㆍ기기류에 대해서는 실내의 환경악화를 초래         하지 않도록 설계하여야 한다.

다) 환기 설비

(1) 환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며,          공조설비와 조화되도록 하고, 적합한 환기설비를 하여야 한다.

(2) 환기설비는 용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.

(3) 화장실, 샤워실 등과 같이 습도가 많은 곳의 배기 닥트는 STS 재질 등 내식성 자재를         사용하며 단독 배기로 설치하여야 하며 위 각 실의 냄새가 확산되지 않도록 계획한다.

(4) 화장실의 환기는 취기를 신속히 배출할 수 있어야 한다.

(5) 환기시설 및 강제 배기시설 설치로 원활한 환기를 도모한다.

(6) 실내공기질 관리법에 근거하여 공기정화설비 및 환기설비를 계획한다.

라) 위생설비

(1) 급수설비

·급수방식은 건물의 특성, 에너지절약 등을 고려하여 반영하며, 단수 및 비상시에도         안정적 급수가 가능하도록 계획한다.

·급수는 시수 직결식, 가압 급수방식 및 고가수조 방식을 검토 후 현지여건에 적합한         방식을 채택하고 적정수압을 항상 유지하여야 한다.

·적절한 수충격 방지대책을 수립하고 펌프 동력을 최소화할 수 있도록 설계한다.

·위생기구는 실내 환경과 조화를 이룰 수 있는 견고하며 신뢰성이 있는 한국산업표준(K.S)          규격품 또는 동등 이상품을 사용하며, 기구별 최소 사용압력을 고려하여 설계하고         위생기구는 절수형 위생기구를 설치한다.

·급수관의 횡주관, 입상관은 분기시 마다 차단 밸브를 설치한다.

·수충격 및 수축팽창 방지를 위하여 수격방지기를 펌프류 입상관 등의 적정 장소에 설치한다.

·수격현상이 발생할 수 있는 개소에는 워터햄머 흡수기를 설치하여 배관의 충격           소음 및 진동을 방지하도록 한다.

(2) 급탕설비

·급탕설비 장비 선정시 여건에 맞게 선정 공급하도록 구성한다.

·급탕설비는 온수가 압력변화 없어야 하며 안정적으로 공급되도록 한다.

(3) 오ㆍ배수설비 및 통기설비

·오수ㆍ분뇨설비는 관련 규정에 적정하게 계획한다.

·오ㆍ배수는 중력식(자연배수)으로 계획하고 위치상 중력식이 곤란한 경우 집수정 또         는  집수탱크를 설치하여 강제 배수식으로 하되 냄새확산이 되지 않도록 한다.

·배수계통은 일반 잡배수, 오수, 우수 등으로 분리한다

·강제배수 펌프는 2대 설치를 원칙으로 하며 평상시 자동교환 운전을 하고 비상시에는         동시에 운전이 가능하도록 설계한다.

·오ㆍ배수 배관에는 원활한 배수가 되도록 통기관을 적절한 위치에 설치한다.

·통기방식은 개별통기, 루우프통기, 신정통기, 결합통기 및 도피통기방식 등을 검토하

여  각 위치에 적합한 방식을 적용한다.

·오수 및 일반 잡배수용 입상관, 배관은 배수시 발생되는 소음 및 진동을 방지하기         위한 대책을 강구하고 통기가 원활히 되도록 한다.

·오ㆍ배수 배관 계획시 최하층은 역류되지 않도록 한다.

(4) 소화설비

·소방기본법과 소방시설공사업 법령, 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법령, 위험물안전관리법에서 정한 기준을 준수하여 설계하여야 한다.

·소방 설비의 기본계획은 최상의 기능을 발휘하고 유지관리가 용이하도록 하며 화재를        사전에 예방하고 화재가 발생한 경우에 조기 감지 및 초기 진화할 수 있어야 한다.

·화재가 발생하면 즉시 감지하고 외부의 소화활동 없이도 자체 진화가 가능한 설비를  설치한다.

·재료는 내부식성, 내구성, 견고성, 효율성, 내진성 등이 우수한 것으로 선정하고 정확한        기능을 발휘할 수 있는 장비 및 기기를 검토하여 배관 설비를 계획한다.

·비상시 사용자의 안전 확보를 위한 방재설비를 반영한다.

·인명피해방지를 위한 경보 및 피난유도시설과 화재를 초기에 진압할 수 있도록 각실 및        기능단위 특성에 적합한 소방시설을 계획하여야 한다.

- 소방설비 : 소화기, 옥내소화전, 스프링클러, 물분무소화설비, 옥외소화전, 피난설비,         동력펌프, 상수도 소화용수설비, 제연설비, 연결송수관, 연결살수설비 등

·배연설비 등은 환기설비를 최대한 활용하여 구성하여야 한다.

·피난기구는 건축 평면계획 및 피난동선 등을 고려하여 설치한다.

(5) 자동제어설비

·건물내 각종 설비의 감시 및 원격 제어가 용이하여야 한다.

·자동제어 시스템 선정 시 효율성, 경제성 및 에너지 절약을 종합적으로 고려한다.

·각 설비기기(공조기, 보일러, 각종 탱크, 펌프, 송풍기, 급배수시설)의 자동제어방식        적정여부를 검토하여 설계한다.

·정전시 자동제어 장비의 전원공급을 위하여 중앙감시(통합관리) 시스템 전용의 UPS를  계획한다.

·향후 설비의 증설이나 유지보수시 추후 관제점 확장에 제한이 없는 시스템을 채택한다.

·자동제어 설계기준

- 유지관리가 용이하여야 하며 타 시스템과 네트워크 구성이 용이하여야 한다.

- 각종 온도, 습도, 압력의 감시 및 상ㆍ하한 경보, 장비의 이상 상태에 대한 경보가         가능하며, 기기의 기동/정지 상태의 감시가 이루어져야 한다.

- 절전 운전제어, 최적 기동제어, 화재시 연동제어, 공조기 제어가 되도록 한다.

- 습도제어 및 냉ㆍ난방 온도제어 기능을 가져야 한다.

·자동제어장치 구성

자동제어시스템은 IBS(Intelligent Building System)에 가장 적합한 방식으로 선정하며,       이상시 신속하게 대처할 수 있고 안정성과 호환성을 갖춘 시스템이어야 한다.

- 중앙제어장치

⒜ 복잡한 여러 설비계통을 합리적이고 효율적으로 운용

⒝ 필요한 정보의 집중화

⒞ 각종 기기의 운전상태의 파악

⒟ 경보기기의 조작 및 상태기록 작성

⒠ 프로그램 운전, 수요제한

⒡ 운전조작의 편리성, 유지보수의 용이성, 에너지 절약

- 현장 조절장치

공기조화, 위생 등의 기계설비 계통에 있어서 과다한 냉난방 방지 및 수위 수온조절       등으로 에너지 절감효과를 기대할 수 있도록 하고, 검출기, 조작기 등은 다음과 같은       기능을 갖도록 한다.

⒜ 냉각코일, 가열코일의 용량 제어

⒝ 가습량 제어

⒞ 각종 탱크의 액면 감시 및 제어

⒟ 급수, 배수탱크의 가동 및 상태 감시(경보설비)

⒠ 온수탱크 및 열교환기 등의 온도제어

⒡ 공급 및 환수 헤더의 압력차 조절

⒢ 부하에 따른 각종장비(보일러, 냉동기, 펌프 등)의 가동대수 제어

⒣ 자동제어설비는 기계, 전기, 통신, 소방, 엘리베이터 등 통합감시제어가 완벽하게         이루어질 수 있도록 통합관리시스템을 구축하여야 한다.

(6) 도시가스설비

·가스 차단장치

- 가스차단장치가 설치되는 장소에서는 필히 가스누설 여부 및 차단 상태를 파악할 수 있어야 한다.

- 차단밸브는 역압, 기체압, 전기 또는 스프링 등을 동력원으로 이용하는 것으로 하며        정전시에도 정상적인 기능을 할 수 있도록 보완전력을 갖추는 것으로 한다.

·가스 정압기실

- 지상 옥외의 안전한 곳에 STS 재질의 캐비넷형으로 설치하되 주변환경과 조화가 되어야 하고,         환기소통이 용이함은 물론 가스점검이 편리한 장소로 한다.

- 매설된 도시가스 공급관을 확인하여 설계 반영하여야 한다.(도시가스 공급사 협의 등)

(7) 방음ㆍ방진설비

·실내의 소음과 진동은 실내허용 소음 및 진동기준(관련 규정) 이하로 유지되도록 방지        대책(잭업방진, 소음기 설치 등)을 강구하여야 한다.

·기계, 전기 등의 장비 가동시 발생되는 소음으로 실내ㆍ외 및 주변에 민원이 발생되지        않도록 대책을 강구 하여야 한다.

(8) 오ㆍ폐수처리 설비

·건물에서 발생하는 오수는 오수정화시설에서 처리된 후 옥외 배수로에 방류토록 한다.

·오수정화조 시설에 필요한 설비는 관련법규 및 군포시 조례에 적합하도록 하여야 한다.

(9) 승강기설비

·설계기본방향 : 건축물 규모에 따른 적정한 수준으로 설계하며 일반인, 장애인들이        함께 사용할 수 있는 편리성과 안전성 및 수송능력을 갖도록 계획한다.

·세부지침

- 승강기 사용인원을 고려하여 적정크기의 승강기를 설계

- 승강기 내부에는 시각 및 청각장애인을 위한 안내시스템과 인터폰을 설치하여야 한다.

(10) 신ㆍ재생에너지 설비

·신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법에 따라 건축비의 일정 비율을 신ㆍ    재생에너지를 이용할 수 있도록 설계하여야 한다.

·신ㆍ재생에너지는 설치장소, 유지관리, 경제성 등을 비교 검토하여 가장 합리적인 방식         으로 설계하여야 한다.

·신ㆍ재생에너지는 관련법에 따라 설계용역 납품 전에 모든 행정절차(지열인 경우         지열이용연구회의 사전검토, 기타 신ㆍ재생에너지센터 설치신고 및 승인 등)를 이행하여야         한다.

(11) 기타

·배기가스에 사용되는 연도는 스테인레스와 같이 내부식성 재질로 제작 설치한다.

·각종 검사에 필요한 제반 경비를 설계에 계상하여야 한다.

·장비설치 완료 후 종합 시운전 계획서를 제시하고, 이에 필요한 경비(인건비, 수도,       전기료 등)를 설계에 반영하여야 한다.

·배수펌프 설비의 예비시스템 구성 및 단계별 자동 제어 구성

사. 전기설비

1) 기본지침

가) 계약상대자는 현장조사 등을 실시하여 기존 시설부하 및 수전용량을 판단하고 수전방식,        인입케이블의 재사용 또는 변경, 분전반의 교체 또는 정비 등을 설계에 반영하여야 한다.

나) 안정성, 경제성, 신뢰성, 에너지절약 등을 고려하여 양질의 설계가 되도록 하고, 한전        전기 수전 및 검측 방법을 제시하여야 한다.

다) 용역 준공 시점에서 관계 법규(입법 예고 포함)에 적합하여야 한다.

라) 유지보수 등 관리가 용이하여야 하고 향후 증설, 변경 및 개ㆍ보수에 대한 적용성이 있어야 한          다.

마) 각 종 부하용량은 향후 확장을 고려한 용량으로 산출하여야 한다.

바) 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련 도면        및 시방서에 명기하여야 한다.

사) 고압 수전 시 유지관리를 위한 예비품 및 공구목록을 작성하여야 한다.

아) 본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

자) 건축계획에 의한 실별 특성에 적합한 전기용량 산정을 위하여 유사사례를 충분히        조사하여 설계에 반영한다.

차) 실내에 설치되는 조명 및 전기기구는 가변성 및 에너지절약을 고려하여 계획한다.

2) 설계 범위 및 지침

가) 수변전설비

(1) 전력인입은 기존설비의 재활용여부를 판단하고 필요시 한국전력공사 관할 지점과          협의 후 결정한 후 계획한다.

(2) 변전실을 새로이 설치하여야 하는 경우 변전실의 위치는 전력부하공급의 중심으로서          수해의 피해가 없고 환기시설이 가능하고 장비반입이 용이한 장소로 건축분야와          협의하여 계획한다.

(3) 기존건물의 배전반을 활용시 접지저항, 인입케이블 용량 등 검토 후 설계에 반영            하여야 한다.

(4) 수배전반 교체가 필요하다고 판단될 시 일체형수배전반, 열반형 수배전반 등의 장단점을          비교 검토하여 현장에 적합한 설비로 적용하여야 하며, 적정한 각종 차단기의 사용 등을            검토 한다.

(5) 건물 내 변전실을 설치하는 경우 변전실의 크기는 기기 점검이 용이하도록 벽체와의          충분한 이격거리를 유지하여야 하고 장비의 반출입이 용이하도록 고려하여 계획한다.

나) 예비전원설비

(1) 비상용 발전기설비

· 비상용 발전기는 건축법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 등 관련법규에          대한 검토와 경제성, 유지관리의 효율성을 고려하여 결정하도록 한다.

단, 비상발전기를 설치하지 않아도 각종 법령 등에 적합할 수 있도록 설비가 가능한지를          판단하여 비상발전기의 설치계획을 수립한다.

· 비상용 발전기는 예고정전이나 불시의 정전에 대비하여 시설하며, 연결부하로는 방재          설비에 대한 각종부하, 비상조명, 급배수펌프, 오배수 펌프 등을 운영할 수 있는 충분한          용량으로 계획한다.

· 비상발전기는 디젤방식으로 계획하고, 소음 및 진동에 대한 대책이 강구되어야 한다.

(2) 무정전 전원장치(U.P.S)

· 방범, 방재기기용전원, 통신기기용전원으로 무정전 전원설비를 계획하고, 설치위치          및 대수는 경제성과 유지관리의 효율성을 감안하여 계획한다.

· 무정전 전원장치는 30분 이상 Back Up이 가능하도록 계획한다.

(3) 전력간선설비

·간선의 굵기는 공급신뢰도, 안정성, 경제성 등을 고려하여 다음의 내용을 반영하여 한다.

- 부하의 정격전류, 전압강하

- 수용율, 불평형 부하에 의한 선전류의 증가

- 사용전선의 종류, 기계적강도

- 고조파 전류에 의한 영향

- 장래 부하증가에 대한 여유

·전압강하의 범위는 내선규정 및 제반규정 등으로 고려하여 다음의 내용을 기준으로 하여야 한다.

- 전등 및 전열 분기회로 : 2%이하

- 전등간선 : 3%

- 전산설비 전산기기용 간선 전압강하범위는 기기별 운용기준에 적합하도록 하여야 한다.

·사용전선

- 간선 : 1kv/0.6kv  TFR-CV 또는 F-CV 케이블, 분기선 HFIX전선

- 비상 및 소방용 : 전선 및 FR-8

- 접지선 : GV 전선(전기실내 및 외부 접지인출선,간선), IV 전선(초록색:간선,분기선)

(4) 전등 및 전열설비

·전등설비는 효율이 높은 광원과 조명기구를 선택하고 스위치 회로를 세분화함으로서         에너지 절감효과를 갖도록 한다.

·조명기구 설치기준은 건축마감 재질을 감안, 조도기준, 조명율, 보수율 등을 고려하여야 한다.

·공공기관 에너지합리화에 관한 규정에 의거하여 LED 제품을 설계반영하여야 한다.

·전등은 KSA 3011의 조도기준에 준하도록 하여야 한다.

·비상조명은 한전전원 정전 시 건물 전 지역에 소방법상 필요한 요구조도를 확보하고 상시         겸용으로서 발전기비상전원을 공급받을 수 있도록 실시한다.

·각 실별 특성에 적합하도록 수구를 시설하되 사무공간에는 시스템박스를 적절히 시설         하도록 한다.

·전시실에 알맞은 광원을 선정하고 전시회내용에 따른 조명이 가능하도록 설계하여야 한다.

·무대조명은 건축 및 무대기계설비에 적합하도록 구성하여야 한다.

(5) 소방설비

·건축계획 및 기존소방설비를 참고하여 소방법령 및 건축법령 등 관계법령에 정해진 제반         설비(자동화재탐지설비 등)를 검토하여 설계하여야 한다.

·감지기는 실의 규모에 따라 적합한 감지기를 사용하여야 한다.

·계단, 복도의 통로 유도등은 피난의 방향이 표시되어야 한다.

·기존건물 소방설비와 연동시 기존 설비 용량 및 상태등을 검토하여 반영하여야 한다.

(6) 옥외 조명 설비

·옥외 조명등 설치시 에너지 절약형으로 계획한다.

·외등의 점멸 방식은 주위 조도 감지방식과 점 소등시간 입력방식을 겸용으로 수동         및 자동점멸이 가능하도록 하여야 한다.

·수목등 폴은 주변 경관에 적합한 형태로 앵커볼트가 지중매입 되도록 계획한다.

·수목등 폴의 기초는 견고히 하고 개별접지하고 선로는 지중매설 시공토록 계획한다.

아. 정보통신

1) 기본지침

가) 본 설계는 기존건물 정보ㆍ통신 설비의 활용 여부를 조사한 후 시공관련 설계기준을 제공하        여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 운용 및 확장이 용이하도록 하여야 하며 초고속        정보통신망 접속을 계획한다.

나) 용역 준공 시점에서 관계 법규(입법 예고 포함)에 적합하여야 한다.

다) 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고,       주요자재ㆍ공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

라) 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주기관의 승인을 득하여야 하며, 자재품질은 관련       KS 규격이상의 제품으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것을 사용하도록 하여야 한다.

마) 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련 도면에       명기하여야 한다.

바) 유지관리를 위한 예비품 및 공구 목록을 작성하고 공사비에 반영한다.

사) 본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

2) 설계범위 및 지침

가) 전화(통합배선) 설비

일반전화 또는 모사전송기 등이 필요한 개소를 파악하여 일반전화 UNIT 및 배선을 설계하여야 한다.

나) 방송설비

(1) 기존 설비의 재활용 여부를 판단한 후 구내방송설비를 계획하여야 한다.

(2) 비상 방송설비는 일반방송과 겸용으로 구성하며, 화재 시 비상방송이 우선이 되도록         계획한다.(수신기와 연동)

다) 인터넷 인프라 구축

인터넷 사용가능한 장소를 검토하여 유ㆍ무선인프라를 구축을 계획하여야 한다.

라) CCTV 설비

(1) 수요처의 의견을 청취하여 필요시 CCTV 설치를 고려한다.

(특히, 여성의 안전을 고려한 CCTV 설치)

(2) 주·야간 구분 없이  최적의 화상을 제공하도록 구성하여야 한다.

마) 기타 정보통신 설비

건축계획 및 기능에 적합한 정보 통신설비를 계획하여 설계에 반영한다.

자. 기타사항

1) 건축물 사용 연한에 관한 고려

가) 사용 연한의 확보

(1) 계획 시에 건축물의 사용 기능을 검토하여 요구되는 시설의 용도, 기능의 확보에 대응        할 수 있도록 한다.

(2) 계획에 있어서는 장기적인 사용 기간을 상정하여 사용 조정 및 용도 변경에도 대응 가능토록        필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

나) 내구성의 확보

(1) 계획 시에 건축물의 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축 구조, 설비 및 건축         비(非)구조 부재의 합리적인 내구성 향상에 노력한다.

(2) 건축 구조(구조체)에 있어서는 건축물의 내용기간 중 대규모 수선이 발생되지 않도록         내구성 향상에 특별히 유의하고 건축 설비 및 건축 비(非)구조 부재에 있어서는 건축물         의 사용 기간 중 수차례의 대규모 수선이 필요함과 균형 있는 수선 주기를 고려하여 합         리적인  내구성을 확보할 수 있도록 계획한다.

2) 에너지 절약

가) 계획 시에 부지의 환경 조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의       외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을        고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모하기 위해 에너지효율 등급 1등급        기준을 목표로 설계한다.

나) 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자ㆍ공급자 등의 책무), 공공기관 에너지        이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시) 및 고효율에너지 기자재 보급        촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시)에 의하여 고효율기자재를 사용한다.

다) 신ㆍ재생에너지 사용계획은 분야별 적용 가능한 방식을 종합적으로 검토, 분석하여        실질적으로 에너지 절약에 기여하는 방식으로 계획한다.

3) 비용에 대한 고려

가) 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시한다.

나) 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

다) 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교ㆍ검토되어야 한다.

4) 재료 및 마감계획

가) 불특정 다수가 이용하는 공공시설물임을 감안하여 내구성이 좋으면서 유지관리가         용이한 재료로 하되 밝고 편안하고 친근한 분위기의 실내를 조성하도록 설계한다.

나) 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성 등 안전성과 시공성이

용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

다) 창호는 에너지 절감 및 방음, 방범, 기밀성을 충분히 확보하도록 계획한다.

라) 시설의 특성을 고려하여 출입문의 잠금장치는 층별  사용 용도에 따라 보안 및 유지관리가 용이한 체계를 고려하여 계획한다.

5) 방범 기준

가) 도시환경의 범죄에 대한 방어적 디자인(Defensive Design)을 통하여 범죄 발생 기회를       줄이고, 범죄에 대한 두려움을 덜 느끼며 근무할 수 있도록 공간을 구축하는 셉티드       (CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design) 등 종합적인 범죄 예방        전략을 수립하여야 한다.

나) 침입자가 발생하였을 경우 쉽게 관찰할 수 있도록 가시권을 최대화 시켜 건물을 배치하는 등       자연적 감시를 용이하게 하고, 출입통제장치 등으로 침입자의 접근을 차단하기 위한       자동 팝업볼라드 등을 설치 접근 통제수단을 제시하고, 울타리ㆍ로비계단 표지판 및        조경 등을 통하여 영역을 구획하여야 한다.

다) 지하주차장 등 여성의 범죄피해가 염려되는 장소의 경우 범죄예방을 위하여 지하주        차장은 비상벨, CCTV, 조명 등 설계기준을 제시하여야 한다.

차. 관련법규 적용기준

계약상대자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신(근)의 정부제정 각종 공사시방서 및       기준에 의거(적용하는 기준은 최신에 제정된 것을 우선하여 적용) 설계를 수행하여야 하며,     준수하여야 할 관련 공사시방서, 기준 및 법규 중 중요한 것은 다음과 같다.

❍  건축관계법규, 지진·화산재해대책법, 시행령, 시행규칙 등

❍  건설기술진흥법, 건설산업기본법, 산업안전보건법, 엔지니어링산업진흥법

❍  에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법

❍  전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술 기준의 판단기준

(산업통상자원부)

❍  전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법, 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙, 유선방송국 설비 등에 관한 기술기준(과학기술정보통신부)

❍ 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정, 유선방송국 설비 등에 관한 기술기준(과학기술정보통신부)

❍  소방기본법, 소방시설공사업법, 화재예방·소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물 안전관리법, 화재안전기준(소방청)

❍  장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률(보건복지부)

❍  분야별(건축, 토목, 설비, 콘크리트, 가설공사 등) 표준시방서(국토교통부)

❍  건축구조기준(대한건축학회, 2009)

❍  조경설계기준(국토교통부)

❍  건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부)

❍  고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부)

❍  건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부)

❍  건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

❍  녹색건축물 조성 지원법, 시행령, 시행규칙 등(국토교통부)

❍  녹색건축 인증에 관한 규칙, 녹색건축 인증기준(국토교통부), 건축물에너지효율인증에 관한 규칙,         장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준        및 수수료기준

❍  콘크리트구조설계기준(한국콘크리트학회)

❍  건축물의 범죄예방 설계 가이드라인(국토교통부)

※ 기타 본 용역과 관련되는 제반 법령, 규칙, 예규, 훈령, 고시, 조례 등 규정

Ⅳ. 성과품의 작성 및 납품

가. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여     작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

1) 예비검사

계약상대자는 설계용역 준공예정일 10일전에 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고      1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

2) 설계도서 작성기준

가) 설계도서 작성 시 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시 제2018-244호)에 맞도록 작성하여야 하며, 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시) 별표1 및 별표2의 단계별(계획설계, 중간설계, 실시설계) 도서내용의 도서작성 구분 중급 기준으로 하되 감독관과 협의하여 부분적으로 항목을 조정 할 수 있다. 그리고 설계내역서 작성 등은 최종 설계도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 물량 등의 착오가 발생하지 않도록 하여야 한다.

나) 모든 도면은 CAD System을 이용하여 전자화된 형태로 작성하되 건설CALS/EC 전자도면         작성표준(건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조)에 따른다.

3) 엔지니어링산업 진흥법 제27조(설계도서의 등의 서명날인) 및 건설기술 진흥법 시행규칙 제43조(설계도서 작성참여 기술인의 업무 수행 내용 명기)에 따라 모든 설계 참여자(사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및 보고서에 서명 날인할 것

4) 계약상대자는 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

5) 기 타

가) 시공상세도 작성지침에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 하며, 건설업자가        건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시해야한다.

나) 시공상세도 작성비용은 엔지니어링 사업대가 기준에 따라 산정하여 포함하여야 한다.

다) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설        물의 안전관리를 위한 비용)를 계상한다.

라) 공사예정공정표 : 우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한         교통체증으로 인한 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 공정관리 전문가 참여하여        적정 공사기간을 산정한다.

나. 성과품의 작성

1) 설계보고서

가) 보고서는 제출문과 설계용역 종합보고서 참여기술자 명단(붙임4)을 제출         한다.

나) 발주기관의 지시사항, 설계자문회의 검토사항 등에 대하여 내용, 조치 또는 설계         반영 내용을 보고서에 부록으로 삽입한다.

다) 기타 보고서의 작성순서, 편집방법 등은 인쇄 전에 감독관과 사전협의 후 시행한다.

2) 설계 설명서

가) 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용                   및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.

나) 건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정,                   평면ㆍ입면ㆍ주요 단면 선정, 구조ㆍ부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설                    계내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 차량, 보행자 동선 등에 관한                     동선계획

다) 토목 분야 : 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 골재원 및                    사토장 선정 , 배수처리계획(공사중계획 포함), 신기술.신공법 선정에                    관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가

라) 조경 분야 : 식재 및 시설물 계획, 옥상조경계획, 수목이식계획, 세부공정계획, 세부                    공사비, 유지관리계획 등

마) 기계 분야 : 주요설비, 냉ㆍ온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, 친환경 설계내용,                    에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

바) 전기 분야 : 전력간선, 전등전열 기타 관련 설비, 전기 및 전화설비 공급 방법,

에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 친환경 설계내용, 세부                    공정 계획, 세부공사비 산정, 친환경 설계내용 등

사) 통신 분야 : 통신선로, 방송설비, 감지설비, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

3) 각종계산서

가) 시설물별 내진설계 기준에 따라 내진설계 내용을 명시(지진·화산재해대책법 제14조)

나) 해당 건축물 내 구조계산서(건축,토목), 전력부하계산서, 조도계산서, 냉난방 부하계산서,         기계 설비 용량 계산서, 에너지 절약계획서 등을 포함한다.

다) 물량산출서

(1) 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공종별로 집계표를          작성하여야 한다.

(2) 공종별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출        내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부 하여 제출한다.

4) 설계도면

가) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

나) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

다) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명        또는 날인하여야 한다.

라) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도,        주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

마) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들 번호 및 도면          명을 표기한다.

바) 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD-ROM에 담아 제출 한다.        (각 파일은 캐드 파일과 일반 범용 그래픽 파일로 변환된 파일을 함께 구분하여 제출한다)

5) 유지관리지침서 등 작성

가) 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성한다.

나) 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

6) 공사시방서

가) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되도록 한다.

(1) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무등에 관한 상세 사항

(2) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

(3) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

(4) 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

(5) 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

(6) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

(7) 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

(8) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차ㆍ방법ㆍ시기

(9) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

(10) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요           인원 등에 대한 상세한 규정

(11) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

(12) 기타 주요공사 사항

나) 공사시방서 작성요령

(1) 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준)는 표준시방서 및 전문시방서를         기본으로 하여 작성하되, 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하여 기본         설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법,         자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리         등에 관한 사항을 기술한다.

(2) 공사시방서는 전문시방서 공종분류 체계에 맞게 작성하고, 자재ㆍ입찰절차ㆍ 공사비ㆍ          공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정ㆍ보완하여 작성           하여야 한다.

다) 공사시방서 작성 일반사항

(1) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여          해석에 이견이 없도록 한다.

(2) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

(3) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

(4) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

(5) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

(6) 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

(7) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자 등이         직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

(8) 사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을          표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

(9) 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

7) 공사내역서

가) 공사비 내역서는 국토교통부 ‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 협의         하여 적용하고 “행정안전부 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령 ” 및         건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준에 의하여 산출한다.

(1) 재료비

·조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.

·조달청 조달정보에 미 수록된 자재는 재정경제부에 등록한 전문기관에서 조사,           공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용 하여야 하며, 단가           조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

·상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의           거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다. 단 그러하지 못할 경           우에는 그 타당한 사유를 기재하여야 한다.

(2) 직접노무비 : 대한건설협회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

나) 예정공사비를 초과하지 않는 범위 내에서 작성한다.

다) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는         자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록한다.

라) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할          수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

마) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

바) 복합단가의 산출은 일위 대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조            작성하여야 한다.

사) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하 여야 한다.

아) 운반비는 목적지, 운반장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등          운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

자) 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기         쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

·지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙

·지방재정법 및 동법 시행령, 재무회계예규 등

8) 예정공정표 작성

예정공정표는 PERT- CPM 기법으로 청사진에 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축소하여 대표자      날인 후 제출 한다.

9) 설계도서 검토

가) 검토 방법

(1) 설계시행 책임기술자가 검토

(2) 각종계산서 확인 검토

(3) 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

(4) 공사분야별(건축, 기계설비, 전기설비, 통신설비 등) 도면 일치 여부 검토

나) 제출도면

(1)검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된         설계도서 및 검토도면 1부 제출

다) 제출시기 : 중간검토 및 준공 시 제출

10) 기타

가) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

나) 도면의 크기는 KSA5201의 A0∼A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

다) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다.         그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

다. 성과품의 납품

1) 성과품 납품시기

성과품의 납품은 계획 설계 검토협의, 기본(중간)설계 납품, 실시 설계도면 납품,         실시설계 최종납품으로 구분한다.

(1) 중간설계(기본설계) 납품 : 착수일로부터 120일 이내

(2) 실시설계 최종납품      : 착수일로부터 240일 이내

2) 성과품 종류 및 납품부수

가) 중간설계 성과품의 종류 및 납품부수

(1) 설계설명서 ------------------------------------------------------  5부

(2) 기본설계심의용 도면  -------------------------------------------   5부

납 품 목 록	규 격	수 량	비 고
기본설계보고서(지반조사보고서 포함)	A4	5
기본설계 도면(A3반책)	A4	5
공사시방서	A4	5
설계내역서	A4	5

(3) 기본설계도면(납품) -----------------------------------------------  5부

나) 실시설계 성과품의 종류 및 납품부수

(1) 종합보고서 A4(설계설명서, 공사개요,추진경위,용역계약현황,용역의진행과정,

참여기술자현황, 하도급자현황, 수정.보완사항 및 조치결과, 건물유지관리계획서,

납품설계도서 목록 등 일체 기재하고, 제품선정 및 장단점 비교등을 포함

(2) 실시설계 성과품 납품 ------------------------------------- 붙임 1참조

(3) 분야별 최종 성과품 납품확인자 날인 ----------------------- 붙임 2참조

Ⅴ. 붙임자료

1. 최종 성과품 납품 목록

2. 분야별 납품확인자 서명부

3. 책임기술자 선임계 서식

4. 용역수행계획서 참여기술자 명단 서식

5. 설계용역 종합보고서 참여기술자 명단 서식

6. 보안각서 서식

7. 설계 검사원(중간설계, 실시설계) 서식

8. 주간공정보고 서식

9. 월간 공정보고 서식

【붙임 1】최종 성과품 납품 목록

가. 건축(토목, 조경 포함), 기계(소방포함), 전기(소방포함), 통신

종 류	규 격	부 수	비 고
설계원도 분야별 설계도면 (A3반책)	A1 A3	각 2 각 3	※공종분야별 구분 등에 대하여는 감독관과 협의하여 제출한다. (전기ㆍ통신 및 기계공사는 각 성과품별로 별도 작성 제출한다) ※전기, 통신의 경우 구조 계산서, 설계표준화 편람 및 도서, 조감도는 해당되지 않는다.
출력도면 file(PDF file) 설계설명서	CD-ROM A4	2 3
공사시방서 및 특기시방서, 관급시방서 구조계산서(내진설계 포함)	A4 A4	각 3 3
설계내역서(실내역)	A4	각 3
관급내역서	A4	각 3
일위대가(실)	A4	각 3
단가산출서	A4	각 3
수량산출서	A4	각 3
각종설계계산서 (에너지절약계획서 포함)	A4	각 3
각종 설계기준 및 자료	A4	각 2
조감도(CG) 고용량, 저용량	jpg	각 2
자재내역서	A4	각 2
건축 프리젠테이션 판넬	A2	1식
내부 색채계획도(채색)	A1	1식
공사 예정공정표(CPM/PERT)	A3	2
유지관리지침서(분야별 통합분)	A4	3
토질조사보고서, 수리계산서	A4	3
건설기술심의 등 자료(공사설명서, 설계도서, 제안설명서 등)	-	소요량
CD-ROM	-	1
USB	-	2
기타 관계부서 협의용 설계도서	-	소요량

※ 각종 인허가 서류 : 건축ㆍ소방ㆍ각종 협의허가서류일체(완료),  녹색건축인증, 에너지                       효율등급인증, BF 등 일체자료 및 기타 발주기관에서 정하는 사항

【붙임 2】

□ 분야별 최종성과품 납품 확인자

○건축담당 :                    (서명)

○토목담당 :                    (서명)

○조경담당 :                    (서명)

○기계담당 :                    (서명)

○전기담당 :                    (서명)

○통신담당 :                    (서명)

○소방담당 :                    (서명)

※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출한다

ㅇ설계도면(도면목록화일 및 한글폰트화일 포함)과 시방서는 CD-ROM(5조)에 종합하여 제출하여야 한다.

ㅇ내역서 작성요령은 조달청에서 통보한 “건축공사 계약요청시 설계도서 작성

요령”을 준용하여 발주기관과 수시 협의한다.

분야별 납품 확인자 서명부

【붙임 3】책임기술자 선임계 서식

책 임 기 술 자  선 임 계

1. 용 역 명 : 「부곡동 종합사회복지관 건립」기본  및  실시설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2020.   .   .

4. 착수일자 : 2020.   .   .

5. 준공예정일 :

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 생 년  월 일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2020.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

군 포 시 장  귀하

【붙임 4】용역수행계획서 참여기술자 명단 서식

용역수행계획서 참여기술자 명단

ㅇ용 역 명 : 「부곡동 종합사회복지관 건립」기본  및  실시설계용역

ㅇ용역기간 :

ㅇ용역회사 :

ㅇ용역참여자(총괄ㆍ분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격증번호

【붙임 5】설계용역 종합보고서 참여기술자 명단 서식

설계용역 종합보고서 참여기술자 명단

ㅇ용 역 명 : 「부곡동 종합사회복지관 건립」기본  및  실시설계용역

ㅇ용역기간 :

ㅇ용역참여자(총괄ㆍ분야별 책임 및 참여기술자)

기술 분야	설계참여기술자						서명 (실명)
	성 명	직책	생년월일	자격종목 및 등록번호	참여기간	참여세부 수행내용

자격종목 : 국가기술자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록번호를 기재

수행내용 : 분야별 책임기술자 중심으로 주요시설물에 대한 수행한 핵심공법을 파악할             수 있도록 기재

【붙임 6】보안각서

보  안  각  서

1. 용 역 명 : 「부곡동 종합사회복지관 건립」기본  및  실시설계용역

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 준공예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제9조 2호(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

4. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 발주청에게 귀속됨을 알고 별도로 발주청의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2020.   .   .

주        소 :

생 년 월 일 :

기 술 분 야 :

성        명 :                   (인)

군 포 시 장  귀하

【붙임 7】설계 검사원(중간설계, 실시설계) 서식

설계 검사원 (중간설계, 실시설계)

1. 용 역 명 : 「부곡동 종합사회복지관 건립」기본  및  실시설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 :    .   .   .

4. 착수일자 :    .   .   .

5. 준공예정일 :

붙 임 : 1. 납품설계도서 목록 1부

2. 전자도면작성 확인서

(중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

군 포 시 장  귀하

【붙임 8】주간 공정보고 서식

주간 공정보고

◦ 용 역 명 : 「부곡동 종합사회복지관 건립」기본  및  실시설계용역

◦ 용역개요 :

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 :    년  월  일 ∼    년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

◦ 용역진행사항

구 분	전주 진행사항 ( . . .~ . .)	금주 예정사항 ( . . .~ . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정 / 예정공정(%) (공정률)표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

군 포 시 장  귀하

【붙임 9】월간 공정보고 서식

월간 공정보고

◦ 용 역 명 : 「부곡동 종합사회복지관 건립」기본  및  실시설계용역

◦ 용역개요 :

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 :     년   월   일 ∼     년   월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

◦ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 ( . . . ∼ . . .)	비 고
첫째주		실시 / 예정공정 (%)(공정률) 표기
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익월	공정 지연시 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

군 포 시 장  귀하