부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계

과  업  지  시  서

2025. 1.

(교통정책과)

목  차

제1장 과업 일반사항

1. 과업의 개요	1

2. 설계용역의 일반사항	4

3. 법령등의 적용 및 시방서 작성기준	8

제2장 과업진행 및 일반지침

1. 도서 작성	10

2. 제출서류	10

3. 업무보고 및 회의 등	11

제3장 설계 일반지침

1. 일반사항	15

2. 분야별 설계 일반지침	16

3. 설계도서의 분리작성	25

4. 설계도서 표기	25

5. 도면작성	26

제4장 단계별 과업지침

1. 계획설계	27

2. 기본(중간)설계	29

3. 실시설계	34

제5장 도서 납품목록	41

제6장 관련서식

1. 보안각서	44

2. 책임기술인 선임계	45

3. 책임기술인 선임계	46

4. 설계검사원(계획,중간,실시)	47

5. 주간공정보고	48

6. 월간공정보고	49

제7장  예정공정표	50

제1장 과업 일반사항

1. 과업의 개요

가. 용역명: 부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

나. 과업의 배경 및 목적

○ 부평역은 경인선과 인천1호선이 교차하는 환승역이며 GTX-B 노선 신설시 Triple 환승역이 되어 광역교통의 핵심 거점으로써 지역 성장의 동력이 될 역사이다.

○ 그러나, 기존 경인선, 인천1호선의 철도노선과 버스, 택시 등 연계교통수단과의 환승 거리가 적정 환승 서비스 수준(LOS “C”)에 크게 못 미치는 열악한 수준으로(LOS “F”) 대중교통 이용객의 불편과 이용 저하를 초래하고 있으며 특히, 현 체계 내 GTX 정거장 신설 시 환승 불편 문제가 더욱 가중되어 수도권 광역교통의 빠른 수송을 목적으로 하는 GTX의 실효성이 저하될 우려가 크다.

○ 또한, 부평역세권은 동양 최대 지하상가와 민자역사가 위치한 동북권의 중심상업지역이자 하루평균 6.5만명의 철도이용자가 발생하는 인천시 대표역사로 상업시설과 철도 이용객이 혼재된 지하공간이 GTX 개통으로 복잡성의 심화가 예상되는바, 신설되는 GTX 정거장 및 환승센터와 지하공간 연계 필요성이 매우 높다. 이에 선제적 환승센터 구상이 요구된다.

○ 이에 따라 대중교통의 편의성을 높이고 교통 혼잡 완화를 위한 GTX 환승센터를 조성하여 수도권과 도심을 원활하게 연결하고 효율적인 환승시스템 제공을 목적으로 한다.

다. 과업위치 및 부지면적

1) 과업위치: 인천광역시 부평구 부평동 738-21 일원

- 부평역 (지하철 1호선 부평역 포함) 및 부평역 광장 일원

2) 부지면적: 21,341㎡

라. 주요시설 개요

1) 예정 공사비: 약 254억원(부가세 포함)

2) 연면적: 약 9,970㎡(조정 가능)

3) 지역지구: 일반상업지역

4) 세부시설

가) 세부내용 및 용도

구 분		내 용
건축면적		1,297.61㎡
연 면 적	합 계	9,970.16㎡
	지상 연면적	347.61㎡
	지하 연면적	9,622.55㎡
	용적률 산정용	347.61㎡
건축규모		지하1층, 지상1층
건축용도		지하광장(기본계획 참조), GTX 로비, 환승주차장
주차대수		환승주차장 46대 계획

나)실별 규모(SPACE PROGRAM)

실 명		단위면적 (A)	실 수 (B)	면적계 (C=A×B)	비 고
지하1층	설비공간	200	1	200
	사무실(관리)	40	1	40
	안내공간	25	1	25
	지하광장	6,836.55	1	6,836.55
	화장실	85	1	85
	공용(계단실,에스컬레이터 등)	250		250
	환승주차장	2,186	-	2,186	주차면수 46대
	소 계			9,622.55
지상1층	GTX 로비	287.61		287.61
	성큰캐노피	950		950	면적 제외(지하면적 포함)
	공용(계단실,로비등)	60	-	60
	소 계			347.61
합 계(Gross)				9,970.16

다) 기타 건축에 수반되는 철거, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방, 보안설비 등

※ 시설 규모 및 세부 용도는 협의 과정에서 변경될 수 있음.

마. 과업기간

착수일로부터 15개월 (공휴일, 각종 심의 및 협의 등 인허가 일체, 인증기간 포함하며 GTX-B노선 설계와 연계하여 조정)

바. 과업 범위

1) 실시설계 범위

건축(인테리어 포함)․구조․토목(도로, 상하수도)․조경․기계․통신(보안시설 포함)ㆍ소방, 폐기물처리, BF인증, 구조안전진단 등 분야별 설계지침에 따른 실시설계 및 도서 작성

2) 용역 범위

가) 주변현황 조사

나) 현황측량

다) 지반조사(별도 발주), 지반조사 용역 대가 산출내역 및 과업내용서

라) 기본 및 실시설계도서 작성

◦ 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)

◦ 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침

(국토교통부 고시)

마) 교통영향평가 및 설계경제성검토(VE) 지원, 설계자문(필요시 기술심의) 및 각종 관계 법령 규정에 따른 인․허가(실시계획인가, 철도 보호지구 행위신고 및 건축협의) 관련 서류작성 및 관련기관(부서) 협의

*도시관리계획 결정(변경)이 필요한 경우 그에 필요한 서류 포함

바) 각종 인증(BF 예비인증) 취득(인증 수수료 별도)

사) 설계 안전성 검토 및 설계안전보건대장 작성

아) 공사 예정 공정표 작성 및 조감도

자) 기존 건축물 철거에 대한 설계도서(필요시)

차) 부평역 부근 택시정류장 및 버스정류장 이전 및 설치 업무

카) 지하안전평가(또는 소규모지하안전평가) 용역 대가 산출내역 및 과업내용서

타) 구조안전진단 산출내역 및 과업내용서

파) 기타공사를 수행하는 데 필요한 제반 설계도서 작성

하1) 사업수행과 관련하여 발주청이 요구하는 기타 조서 및 자료 등

하2) 미래 모빌리티의 구현(UAM, PM, 자율주행 등)

하3) 소규모 재해영향평가

하4) GTX-B 노선과 연계하여 세부계획 수립 시 매몰비용이 발생치 않도록 검토

3) 범위변경 : 사업계획 변경 등의 사유가 발생 시 관련 규정 등에 따라 변경할 수 있음.

2. 설계용역의 일반사항

가. 설계용역의 정의

본 설계용역의 최종도면은 건축법, 소방 등 관련법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 지적법 등 관련 법규와 각종 고시 및 공고 기준에 위배됨이 없이(관계기관과의 협의, 소방 협의 등 포함) 완료되어야 하며 법규 등이 개정되었을 때는 개정된 규정을 반영하여 설계하여야 한다.

나. 납품

납품은 건축물의 설계도서 작성 기준(국토교통부 고시)에 적합하게 작성하여야 하며, 설계용역 기간 등에 따라 납품회수와 납품도서 작성방법, 부수는 당해 용역 설계지침에 정하는 바에 따르거나, 발주기관과 협의조정 할 수 있다. 아울러 납품일과 사업발주일 간의 차이가 커서 노임단가가 변경된 경우 그에 맞게 설계도서를 변경하여 납품하여야 한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 책임 및 손해에 대해서는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·시행령·시행규칙, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규), 설계․건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부 고시), 건축사법 및 건축사법 시행령에 따르며, 보험증서 또는 공제 증서를 용역 준공 시 제출하여야 한다.

2) 납품 이후에 공사 중 발생하는 설계변경사항(설계도서간 모순 및 현장여건에 의한 변경 등)에 대하여 기술적 자문과 대안검토 및 도서작성(준공도서 포함) 등 협조 요청에 대하여 공사 일정에 차질이 없도록 적극적으로 협조하여야 한다.

3) 다음 경우에는 과업 기간을 정지하거나 변경할 수 있다.

가) 계약일반조건 제8절(2.계약기간의 연장)

나) 계약일반조건 제8절(3.∼5.계약의 해제․해지)

다) 계약일반조건 제8절(6.용역의 일시정지)

라) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

마) 각종 행정절차 이행 등으로 지연될 때 최종 행정절차 이행시까지 용역을 일시 정지할 수 있다.

4) 본 과업수행 시 과업 참여기술자의 퇴직 등 변경이 불가피하여 변경할 경우 사전에 발주처의 승인을 받아야 하며 평가대상 기술자의 경우 사업수행능력 평가기준의 평가당시 배점기준에 만족하는 같은 수준 이상 기술자를 배치하여야 한다.

라. 관계기술자 협력

건축법 시행령 (관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대해서는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

참여기술자의 자격기준은 아래와 같다.

분 야	자 격
건축총괄	• 건축사
건축구조	• 건축구조기술사
토 목	• 토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체로 신고를 필한 업체의 토질 및 기초기술사
조 경	• 조경분야 엔지니어링활동주체로 신고를 필한 자 또는 조경기술사사무소를 등록한 자
기 계	• 건축기계설비기술사 또는 공조냉동기계기술사
통 신	• 정보통신공사업법 등 및 관계 규정의 기술기준에 적합한 자
소 방	• 소방시설공사업법 등 관계 규정에 따른 소방시설설계업을 등록한 자

마. 설계의 기본방향

1) 부평역 및 환승센터의 특수성과 대지의 입지 조건에 적합한 합리적인 설계

가) 제시된 대지의 주변 현황을 고려하여 안정성 있고 조화롭게 설계

나) 부지 내 접근성과 인지성, 사용성을 고려한 적정한 배치

다) 부지 주변의 조망을 고려한 배치

라) 주변시설 진입(접근)이 용이하게 연계되는 최적의 보행자 동선 고려하며  기존 시설(지하상가, 부평역 민자역사, 상인회 주차장 등)과의 높이 차이를 극복할 수 있는 세심한 레벨 계획

마) 공사로 인해 인접시설 운영에 차질이 없도록 기존 설비등 시설물에

대한 이전계획 수립

바) 대지의 안정성을 확보하고 하수, 도로, 공동구, PIT 등이 내려앉지 않도록 대책을 수립, 반영한 설계

사) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선이나 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계

아) 설계서를 자세히 검토하여 설계상 모순이 발생치 않도록 하여야 한다.

2) 주변 교통영향분석을 통한 합리적인 진 ․ 출입 동선 및 주차계획

가) 이용자 추이 분석을 통하여 토지이용계획과 상호 연관하여 경관 훼손을 최소화하는 동시에 기능을 강조한 교통체계를 합리적으로 수립.

타당성 평가 보고서(GTX 환승센터 타당성 평가 및 기본계획) 내 교통체계 개선대책 활용

나) 접근로의 교통량, 이용자 추이분석, 출입구의 적정 위치 및 동선계획 고려

3) 수요를 고려한 미래지향적 첨단 시설 설계

가) 성장과 변화를 예측한 합리적인 규모로 외관은 조형성이 가미된 독창성   있는 설계로 쾌적한 공간 조성

나) 상징성 강화 측면에서 지하광장 도입과 조형화된 상부 계획을 통해    지하상가의 정체성을 극대화하고 장소를 명소화.

다) 공공성 강화 측면에서 지하에 대형 열린 공간을 형성하고, 내부에 편의   시설을 도입하며, 지하상가의 놀거리, 볼거리를 제공.

라) 기능성 강화 측면에서 지하광장은 GTX와 경인선, 인천1호선의 연결 통로   기능하면서 유동 인구를 유인하여 지하상가 활성화를 도모하고 실내   녹지공간을 조성하여 쾌적성을 향상.

마) 전화 및 LAN 구축으로 충분한 통신회선 반영

바) 내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변과 조화롭게 설계

사) 전기 및 정보통신분야(특히 LAN 분야 등)는 미래지향적인 기술기준을 적용

아) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 반드시 적용

4) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) 창호, 내·외벽, 스라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 관련 규정에 적합한 설계

나) 기계설비는 에너지 고효율 자재 사용 및 고효율 시스템 설계

다) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 환경을 최적화하고 건물 용도와 각 실에 따른 적정 조도의 반영

라) 사용자 및 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

5) 환경친화적 부지환경 조성 및 친환경적 설계

가) 합리적인 토지이용으로 쾌적한 환경조성

나) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경친화적으로 설계

다) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

- 소음진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음 ∙방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치기준 등)에 맞게 설계

6) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

다) 다수의 불특정인이 사용하는 시설임을 감안, 범죄예방 건축기준 고시(국토교통부 고시 제2021-930호)를 참고하여 방범에 적합한 설계를 하여야 한다.

7) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계가 되어야 한다.

나) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초계획이 이루어진 설계

- 협의결과 향후 시설의 수직 또는 수평방향으로의 증축계획이 있는 경우에는 이를 설계할 때 반영하여 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립하여야 한다.

다) 골조구조 등 시공 방안에 대하여 현장여건 및 안전, 품질확보 등을 종합적으로 고려하여 최적의 방안을 결정하여야 한다.

바. 설계변경 및 정산

가) 발주처는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정될 때는 설계 용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 발주청의 방침에 따라야 한다. 이때 과업 범위의 증감이 발생할 때 당해 계약 금액을 조정 또는 삭감할 수 있다.

나) 이때 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 지방자치단체입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 ) 제9장 계약 일반조건 등에 따른다.

다) 실시설계 완료 후 산출된 공사비가 추정 공사비보다 적거나 연면적이 감소할 때는 정산하여 감액 조치하며, 추정 공사비보다 공사비가 10% 이상 증가할 때는 설계변경 하여 조정한다.

3. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준

가. 법령 등의 적용기준

1) 설계자는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 ‘국토법’이라 함),  항공법, 소방시설 관련법 등 관련 법규상 건축이 가능한지를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 때는 이에 관한 내용을 관련기관과 문서로 협의하여야 한다.

2) 본 설계용역의 성과품은 제5장 설계도서 납품목록에 의하되 본 과업과 관련 있는 최근의 관련법, 시행령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 제출되어야 한다.

3) 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등), 같은 법시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 국토교통부고시 : 설계도서 작성기준, KSF1501 : 건축제도통칙, KSF1505 : 건축구성재의 기본공차, KSF1509 : 건축부품의 치수 정하기 등 관련 규정에 따르고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때는 발주청과 협의 후 후속 작업을 실시한다.

나. 시방서 작성 기준

1) 공사시방서는 표준시방서 및 전문시방서를 기준으로 작성하되 공사의 특수성·지역여건·공사방법 등을 고려하여 설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술할 것. 또한 관급자재의 발주를 위한 관급자재 시방서를 작성한다.

2) 공사시방서에는 건설업자 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시하여야 하며, 그 작성 기준을 별도로 마련하여 건설업자 감리원 등이 참고하게 하도록 하며, 건설기술진흥법 제48조에 따라 시공상 검토 ․ 확인받아야 하는 대상 공종을 공사시방서에 명시할 수 있다.

3) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 한다.

다. 기타

용역수행과 관련하여 과업내용서에 정하지 않은 사항 및 각종 서식 등 기본적인 사항은 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정(국토교통부 훈령) 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)을 준용한다.

제2장 과업진행 및 일반사항

1. 도서 작성

설계도서의 작성방법은 발주자가 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주자와 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 신․증축 공사 규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 한다.

2. 제출서류

설계자는 설계진행시 다음 서류를 제출하여야 한다.

가. 과업 착수시

설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다.) 2부를 제출하여야 한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술인 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술인(책임기술인 및 분야별 책임기술인 포함) 현황 1부

4) 설계용역수행 조직표 1부

5) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 기타)의 분야별 책임기술인 명단 등 각 1부

6) 설계용역 예정공정표 1부

7) 계약금액에 대한 산출내역서 1부

8) 수행계획공정표

9) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

10) 계약자의 분야별 예정 책임기술자 명단, 업무내용, 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 재직증명서 등 각 1부

11) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 도서 제출시

1) 기본 및 실시설계 작성방법에 따라 지침에서 정한 사항

2) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

3) 최종보고서 필요 부수

4) 건축허가(관련부서 협의사항 포함) 협의서

5) 설계검사원 1부

6) 기타 발주자가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

※『설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한지침』〔국토교통부 고시]『건축물의 설계도서 작성기준』〔(국토교통부고시) 등 관련 규정에 따른다.

3. 업무보고 및 회의

1) 설계자는 설계진행시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

2) 설계관련 설계자문심의, 간담회 등이 개최시 이에 필요한 도서를 작성 납품하여야 한다.

가. 업무 보고

1) 주간 공정보고(협의하여 격주간으로 조정가능)

발주청 감독원과 협의하여 매주 지정하는 요일에 붙임의 양식에 의거 제출한다.

2) 월간 공정보고

발주처 감독원과 협의하여 매월 협의일자를 기준으로 업무수행 사항 및 예정사항을 작성하여 붙임의 양식에 의거 제출한다.

3) 수시 보고

설계용역 진행 중 문제점 발생시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생시 마다 제출하여야 한다.

나. 업무 회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 설계지침서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 발주자는 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출․요구하여 수정․보완 지시할 수 있다.

마) 설계자는 자문회의 등 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무 착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일 또는 착수일로 부터 늦어도 15일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무 착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 수시 회의

가) 설계진행 시 문제점이 발생하거나 기본계획, 기본설계 내용을 적용하기 곤란한 경우 등 문제해결을 위한 보고회의는 상호간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

나) 설계 과정에 있어서는 최적의 설계를 위한 전문가 협의시 발주처의 요구(회의횟수, 시기등)에 적극적으로 협조하도록 한다.

4) 보안성 검토

가) 설계용역사는 본 과업 지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정 단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나) 설계용역사는 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

① 착수 시 보안 대책을 수립하여야 한다.(착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안 각서 첨부)

② 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

③ 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하여야 한다.

5) 용역감독 등

가) 용역감독

과업을 수행함에 있어 설계용역자는 모든 설계과정에서 감독관의 지시감독을 받아야하며 수시로 계약관련 업무 내용을 확인․감독할 권한을 가지며 설계용역자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원 현황

2) 실시설계 보고서 작성현황 및 업무수행상태

3) 기타 확인에 필요한 사항

나) 용역점검

용역업무 수행을 위한 설계품질 확인을 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며,  특별한 사유가 없는한 감독원과 협의하여 지적 사항을 시정하여야 한다.

다) 기타 다른 법령에 의한 인허가 등 행정처리 사항을 면밀히 검토하여야 하며 행정절차 처리를 위한 도서 작성은 물론 추진계획 일정을 서면으로 보고하여야한다.

6) 설계용역자의 책임

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)과 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따른다.

7) 용역수행자의 교체

가) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력․경험 및 자격을 갖추어야 하며 감독원이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우 교체를 요구할 수 있으며 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나) 본 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 또는 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생했을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자 또는 그 이상으로서 발주처의 승인을 받은 후 교체하여야 한다.

8) 관련기관 인․허가 협조

본 과업과 관련하여 인․허가와 기타 사항 등에 관련한 서류작성 요청이 있을  때에는 지체 없이 필요한 서류를 작성 제출하여야 한다.

9) 발주자의 자료제공

과업수행에 필요한 설계자료, 조사자료, 참고서적, 참고문헌, 기타 자료를 제공토록 하고, 다만, 이는 참고용 자료로 “설계용역자”는 그 내용의 오류 및 정확성을 검토하여 확인 후 사용하여야 하며, 용역 완료 후 반납하여야 하고, 멸실 또는 훼손시는 대용품이나 손해를 배상하여야 한다.

10) 설계변경 조건

가) 본 용역 수행 중 발주청의 계획 변경 등 여건의 변동 및 기타 부득이한 사정으로 인하여 설계 변경 및 수정할 필요가 있을 때

나) 용역종료 후 공사발주 진행 시 설계변경에 대한 내용이 발생할 경우에는 즉시 설계변경 도면을 작성하여 공사감독관에게 제출하여야 한다.

다) 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규) 과 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따른다.

11) 계약의 해제·해지

본 용역의 모든 과업은 지방자치단체계약관련법 및 회계예규 “용역계약일반조건”의 관련 규정 및 발주처 사정 따라 계약의 해제 또는 해지할 수 있다.

12) 기타사항

가) 과업의 완료시점 : 보고회 또는 심의 등을 요청하여 통과한 후 성과품 납품과 모든 행정절차 완료 시점으로 한다.

나) 용역 시행 중 본 용역자문위원회의의 의견을 설계에 반영하여야 한다. (또는 용역관련 자문회의시) 위원의 의견을 최대한 반영하고 반영이 불가피한 사항은 그 사유를 설명하여 위원들의 서면확인을 득하여 제출하여야 한다.

다) 과업수행에 필요하면 외국의 전문기술 및 지식의 활용과 정보교환 자료 등 최신기술을 이용토록 한다.

라) 본 과업 내용서에 규정되지 아니한 사항은 발주기관의 관련규정 및 정부관련 법령과 정부제정 각종 시방서․규정 등에 의거 발주기관과 협의하여 수행하여야 한다.

마) 건축․기계분야의 설계는 최근 국토교통부고시의 건축물의 에너지절약 설계기준을 적용하여 반영한다.

바) 각종 시설물은 장애인․노인․임산부등의 편의증진 보장에 관한법률에 적합하게 설계하여야 한다.

사) 모든 자재는 KS 규격제품 및 동등 이상으로 설계하며, 특허공법채택 및 특허자재를 설계에 반영할 경우에는 사유를 시방서 등에 명기하여야 하며, 공사 시행 중 특허권 사용으로 인한 분쟁발생에 대비하여 한계를 명확히 하여야 한다.

아) 과업의 연장 및 일시정지

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 지방자치단체 용역계약 일반조건 등 회계기준과 발주처 사업계획 일정에 따라 과업의 연장 및 일시정지를 할 수 있다.

3장 설계 일반지침

1. 일반 사항

가. 설계도서 작성시 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부고시), 『설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한지침』(국토교통부고시)에 맞도록 작성하여야 하며, 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시) 별표2 및 별표3의 단계별(계획설계, 중간설계, 실시설계) 도서내용의 도서작성 구분 중급 이상을 기준으로 하되 발주처와 협의하여 부분적으로 항목을 조정 할 수 있다.

나. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안 되며 발주처와 협의에 따라 이행한다.

다. 건축, 토목, 조경, 기계, 소방, 통신 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

라. 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

마. 범죄예방 건축기준 고시(국토교통부고시)를 참고하여 방범에 적합한 구조로 설계한다.

마. 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

바. 설계자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사시 도로의 연결관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

사. 진․출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.

아. 장애인 등에 대한 편의시설은 법 및 우리시 관련 조례에서 정한 기준으로 설계하여야 한다.

자. 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 발주처와 협의해야 하고 검토 보고서가 있어야 한다.

차. 조성공사 계획에 대하여 충분히 숙지하고 건설사업관리자 및 설계자, 시공자 등과 사전에 협의 및 검토하여 설계상 모순이 발생하지 않도록 한다.

카. 철도선하부지 시설계획에 따라 철도안전법 제45조(철도보호지구에서의 행위제한등) 제1항의 규정에 의거 철도보호지구에서의 행위신고를 하여야 하며, 또한 기존 철도시설물의 보호를 위한 안전조치(시설한계 설정)를 하여야 한다.

2. 분야별 설계 일반지침

가. 건축 분야

1) 일반 사항

가) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

나) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

다) 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여야 한다.

라) 동선계획시 보행자 및 주차 계획 및 차량 진․출입 등을 고려한다.

마) 벽면은 화장실, 보안성이 중요시되는 실 등을 제외하고는 가변성이 확보되도록 경량칸막이 설계

바) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

사) 건축법에서 정한 규정 즉, 법,령,규칙 및 고시 기준 ․ 지침, 훈령 등을 숙지하여  설계하도록 하며, 특히 복도의 유효너비는 ‘건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙’ 의 기준 이상으로 계획 ․ 설계 하여야 한다.

아) GTX-B 환승주차장, 기존 역사 및 지하상가와의 효율적이고 합리적인 연계와 활용 방안을 제시한다

자) 환승센터와 GTX 및 기존 철도 및 대중교통 수단 간의 원활한 연결을 최우선으로 고려하여 설계하고, 다양한 대중교통 간 이동 편의를 극대화하는 방안을 제시한다.

차) GTX 환승주차장 출입구와 접근로는 교통 흐름, 이용자 추이, 주변 교통 상황을 고려하여 계획하고 진출입구 위치는 보해앚 동선과의 간섭을 최소화하도록 배치하고, 대기 차량 공간을 충분히 확보해 혼잡을 예방하고 필요에 따라 진출입 시간에 따른 신호 체계 도입 등 교통혼잡을 완화할 수 있는 대안을 계획하여야 한다.

파) 환승센터와 연계되는 외부 공간은 도심 복합 공간으로써 차량과 보행자의 흐름을 통합하여 계획하고, 주변 상권 및 주민 편의시설과의 조화를 통해 공간의 휴식 공간과 편의시설을 계획하고 다목적 공간으로 계획

타) 환승센터의 각 공간을 기능에 따라 세분화하여 배치하고, 주요 출입구 및 보행자 동선의 위치를 최적하하여 편리하도록 하고 교통수단 간의 환승 효율성을 고려하여 주요 동선과 실의 배치를 계획하고, 보행자와 차량 동선의 간섭을 최소화하여 이용자 안전을 높인다. 또한 기능별 배치를 통해 공간 활용도를 높이고 공공성과 쾌적성을 동시에 확보할 수 있도록 한다.

파) 구조형식 및 시공방안에 대하여 설계 성능 및 품질, 공기단축, 경제성, 유지관리 효율성, 현장 여건 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

하) 구조형식 및 시공방안에 대하여 설계 성능 및 품질, 공기단축, 경제성, 유지관리 효율성, 현장 여건 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

2) 구조 계획

가) 기능이 적절한 구조

나) 안전한 구조

다) 경제적인 구조

라) 대지의 지반조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조

마) 건축법 제48조, 동법 시행령 제32조, 제91조의3, 동법 시행규칙 제36조의2에 의한 구조안전 및 내진설계, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙(국토해양부령) 및 건축물의 구조안전확인 및 협력등에 관한업무지침, 특히 지진하중에 대한 구조계획시 지진구역 지역계수(S), 지반종류, 내진등급을 건축구조기준(국토교통부고시)에 따라 정확하게 적용하여야 하며, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 제58조에 따라 구조안전확인서를 제출하여야 한다.

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내 자재 중 K.S.품 사용이 원칙이며 K.S.품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주처과 협의하여 선정한다.

다) 부득이 수입 자재 등을 사용시에는 사전에 발주처와 협의하여 결정한다.

다) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

라) 관급자재는 철근, 레미콘, 시멘트 외에 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제6조에 따라 지정한 중소기업자간 경쟁제품 및 제12조에 따라 지정한 공사용 자재 직접구매 대상 동법 시행령 제11조 경쟁제품 및 공사용 자재 직접구매 대상품목 지정내역(중소벤처기업부 2021-35) 지정된 중소기업제품을 확인하여 선정할 수 있도록 협의하여야 한다.

나. 토목 분야

1) 일반 사항

가) 설계에 앞서 기존 설계서를 충분히 숙지하여 설계에 반영하여야 한다.

나) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

다) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

라) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도는 세분하여 작성한다.

2) 현황 측량

가) 현황측량을 실시하여 현황측량 성과도에 의하여 아래의 내용을 작성한다

- 축척,주위도로망,도시계획선,부지경계선 등 설계에 필요한 범위까지 작도한다.

- 기존건물,석축,옹벽,담장,전주,하천,구거 등 지형물에 대하여 도면화 한다.

- 영구구조물에 설정된 수준점(T.B.M.)을 확인 한다.

- 옹벽 및 석축은 높이의 변환지점 높이를 도면화 한다.

3) 토공 및 흙막이 설계

가) 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며, 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

나) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

다) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

라) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지반조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

마) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지반조사 결과 또는 관련 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용 근거를 첨부하여야 한다.

바) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 충분한 설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

사) 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

아) 토목 및 건축물 부분 터파기량 산정과 공사와 관련부분의 설계와 내역은 토목공종에서 일괄하여 설계되도록 하여야한다.

자) 설계 시 오픈 컷(open cut) 등 공사비 절약을 위한 합리적인 터파기 방안을 검토하여야 한다.

4) 구내 우․오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150～200㎜ 이상이 되도록 한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

바) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 한다.

5) 도로 및 포장 설계

가) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 도로 및 주변광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

라) 지반조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 주변도로 및 포장 설계 시 P.P Mat 및 P.E.T Mat 등의 적용을 검토하여야 한다.

마) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 기울기를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

6) 상수도

가) 상수도는 기존 인입 관로를 조사하여 가장 최단 거리로 설계에 반영한다.

나) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

7) 기  타

가) 부지 경계부근은 도로, 인접토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

나) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

다) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나 비탈면의 기울기가 높을 경우(5m 이상)에는 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

다. 조경 분야

1) 일반 사항

가) 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고 건물 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

나) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

다) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 수경공간, 운동공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

라) 조경은 가급적 자연지형을 이용하여 계획하여야 한다.

마) 조경은 해당지역의 조례 등을 고려하여야 하며 본 과업이 성격을 고려하여 이용자 편의 및 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

2) 조경 수목

가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

다) 단지내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

라) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 거리를 확보하여야 한다.

마) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

3) 조경 시설물

가) 벤치, 등의자, 파고라, 음수대 등 시설물은 해당지역의 조례에 의하되 이용자 편의와 활용성을 극대화될 수 있는 위치를 고려한다.

나) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

다) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적인 재료를 사용하여야 한다.

라) 필요에 의하여 옥상정원 조경이나 실내조경을 하는 경우에는 수목의 생육에 필요한 조건을 별도의 계획에 따라 설계에 반영하여야 한다. 이 경우에 건축물의 하중에 의한 안전성, 방수성, 배수관계 계통, 일조량, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

마) 게이트, 울타리, 파고라, 벤치, 음수대, 조경시설물 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성. 발주처와 협의하여 결정한다.

바) 준공 표지석 또는 표지판(내역반영), 설치 위치는 안을 작성, 발주처와 협의하여 결정한다.

라. 기계설비 분야

1) 일반 사항

가) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.

나) H.V.A.C.설비, 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고, 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주처의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

2) 일반 지침

가) H.V.A.C.(Heating Ventilating Air Conditioning) 설비

- 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

- 열병합 발전 및 지역난방, TES, CES 방식의 냉․난방 시스템은 기존시설과 경제성을 비교하여 가장 합리적이고 효율적인 방식을 택하여 설계한다.

- 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.

- 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 가능토록 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

- 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

나) 위생설비

- 급수방식은 현장상황에 따라 발주처과 협의하여 반영한다.

- 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

- 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

- 지역난방, TES, CES 등에 따른 급탕방식은 그 방식의 기준을 따른다.

- 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

- 위생기구는 K.S 제품 또는 동등 이상의 제품을 사용한다.

다) 소화설비

소방시설 관련법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

라) 자동제어설비

자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

마) 기타설비 : 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

마. 정보통신 분야

1) 일반 사항

가) 시설의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다.

나) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다) 설계시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계 한다.

- 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계 한다.

2) 일반 지침

가) 전화설비

- 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

- 교환실의 위치, 교환기의 형식 및 전화수구 수량이 적정하여야 한다.

- 교환대의 규모 및 접지를 검토하여야 한다.

나) LAN 설비

- 정보통신시설은 기술기준에서 첨단시설로 설계에 반영하여야 한다.

다) 약전설비공사

- 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

- MATV설비, CATV설비를 검토하여야 한다.

라) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

마) 전광판 설치공사

바. 도시계획시설(중복) 결정 및 실시계획

1) 도시계획시설(중복) 결정

가) 도시계획시설 (중복)결정에 따른 상세조서를 작성하여야 한다.

나) 도시계획시설 (중복)결정의 사유서 등을 요약 정리를 하여야 한다.

다) 계획 공람공고 시 제출된 의견에 대한 조치계획을 작성하여야 한다.

라) 토지이용계획도는 지적이 표시된 도면에 작성하여야 한다.

마) 도시계획시설 (중복)결정을 위한 위치도, 도시계획시설 결정도, 지형도면고시도 등 행정절차이행에 필요한 입안 도서 및 각종 심의 자료를 작성하되 도시관리계획 수립 지침에 의한 양식에 의하여 작성하고 발주처와 협의하여야 한다.

바) 지적도 및 토지조서는 총괄표 및 세부조서로 구분 작성하고 행정구역 및 지목별로 작성하여야 한다.

사) 기타 발주청의 요구가 있을 시에는 제반 자료와 추가 도서를 작성하여 제출하여야 한다.

2) 실시계획인가

가) 실시계획 승인신청서는 국토의계획및이용에관한법률 및 관련지침에 의해 작성하여야 한다.

나) 본 사업과 관련하여 협의가 필요한 서류를 관련법규에 의하여 작성하여야 한다.

다) 관련 부서 및 관계 기관의 협의를 거쳐 협의 내용에 대하여 반영여부를 발주처와 협의하여 승인서를 작성하여야 한다.

3. 설계도서의 분리작성

가. 건축, 토목, 조경, 기계설비, 통신, 소방, 폐기물 등 공종별로 분리하고 발주 단위별(건축+토목+조경+기계설비,전기,통신,소방, 폐기물)로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등)

나. 또한 공사용 관급자재는 철근, 레미콘, 시멘트 뿐만 아니라 “경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역”(중소벤처기업부2021-35)로 지정 고시된 품목을 설계에 반영하고 발주처가 직접 구매할 수 있도록 관급자재로 분리작성 하여야 한다. (관급자재 품목식별번호 기재)

4. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 용역계약일반조건 제5조에 따라 사용언어는 한국어를 원칙으로 한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다. 또한 설계도면에서 1～2회 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 한다.

다. 도면의 표기내용은 ‘건설CALS/EC 전자도면 작성표준’에 따라 작성한다.

라. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축,기계설비,통신 기타 부대설비 등 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 공사시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

5. 도면 작성

가. 제도용지는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

라. 토목, 건축, 기계설비, 통신도면은 발주처의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계도면에는 건설기술진흥법 시행규칙 제43조에 따라 모든 면에는 참여기술자가 확인한 후 서명 날인하여야 하며 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

제4장 단계별 과업지침

1. 계획 설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 기획업무 내용에 따라 현장조사 및 자료 수집내용을 근거로 건축물의 규모, 예산, 기능, 품질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 실현 가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등)의 기본시스템을 검토하여 발주청의 요구조건을 반영한 계획(안)을 발주청에 제안하여 승인을 받는 단계이며 본과업과 관련하여 계획설계 단계의 도서 납품은 발주청과 협의하여 진행지 않고 기본설계 착수단계와 준공단계에 포함하여 진행한다.

나. 일반 사항

1) 설계자는 대지의 주변상황을 참고로 하여 계획설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주청의 승인을 받은 후 기본설계를 진행하여야 한다.

2) 설계자가 제출한 계획안이 부적합하다고 발주청이 검토의견을 통보 시 설계자는 조속한 시일 안에 새로운 대안을 재 작성하여 제출하여야 한다.

3) 발주청이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완․제출하여 발주청의 승인을 득한 후 계획설계는 기본설계기간에 포함하여 진행한다.

다. 계획(안) 작성 시 고려사항

1) 설계설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Masterplan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 기존 구조물(방음벽, 교량 및 기둥)과의 저촉 및 시설한계 설정

6) 각 교통수단간(철도, 버스, 택시, 승용차, 보행자) 연계 및 환승시설구상

7) 조경계획

8) 개략공사비 산정

9) 기타 필요한 사항 및 발주청 요구사항(기존 유사건물 조사분석자료 등)

라. 현장 조사방법

현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

1) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 기상통계에 의한 과거 기상기록 통계자료 조사

- 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례 등 특이한 사항을 모두 조사하여야 한다.

2) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지내 경작물, 대지내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

3) 자연환경조사

- 기상 : 기온, 습도, 풍향, 풍속 등을 조사 설계에 반영한다.

- 지형 : 경사도, 지표상태 등을 조사 설계에 반영한다.

- 식생 : 수목 및 식생의 조사 및 양호한 경관을 검토 반영한다.

4) 인문환경 조사

- 지역사회의 성격 : 지역의 성격, 인구 및 산업 등 성격을 조사 반영한다.

- 토지이용 : 대상지의 토지이용상 여건을 조사한다.

- 지리적 특성 : 주변의 역사, 유물, 향토수종 등 시설지와 연관이 된 지리적 특성을 조사 분석한다.

2. 기본(중간)설계

가. 정의

“기본(중간)설계”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주청으로부터 승인을 받는 단계를 말한다.

나. 일반 사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 한다.

3) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산 등 구조계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

5) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주청의 승인을 받는다.

다. 측량 결과 반영

1) 일반사항

가) 측량성과도에 의하여 설계한다.

나) 설계자가 설계목적상 추가로 필요하다고 판단되는 조사사항은 설계자 부담으로 실시한다.

다) 발주청이 서면지시하는 추가조사에 대한 경비는 실비 정산한다.

라) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 관련법에 문제가 없도록 하여야한다.

2) 측량결과 반영

가) 현황측량 성과도의 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량 성과도 내용을 반영한다.

나) 현황 측량성과도의 방위, 축척, 경계, 주변도로 도시계획도로선, 철탑 및 전주,  T.B.M, 수로, 지하구조물, 지하 지장물, 주변건물 등 모든 측량성과 내용을 표기하여 도면 작성 한다.

라. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 계획설계내용

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 개략공사비 산정

※ 일위대가표는 불필요하나 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요자재계획

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배  치  도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치, 기타 시공에 필요한 사항

- 대지 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항

- 입면도(4면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

2) 토목

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

※ 지반고는 측량 결과에 따라 계획하여야 한다.

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서

- 수리계산서

다) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 및 기타 산출근거

라) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적표(배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 조형물, Pergola, Bench, 음수대, 휴지통, 안내판류 등 조경시설물

4) 기계설비

가) 설계 설명서

설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주청의 지침을 받아 작성)

다) 설계 계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

- 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

- 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 회선 용량계산서, 전계강도 계산서, 교환기 용량계산서

- DVR 용량계산서

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등) - 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타통신설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및  기타 필요설비의 배치도

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

3. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 계획설계 및 중간설계(기본설계)를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 칫수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반 사항

1) 기본설계(중간설계)를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 전기, 통신분야는 「전력기술관리법」에 따라 실시설계는 분리 발주하며, 기본설계를 기초로 실시설계 지침을 작성한다

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부 시공방법

- 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조 계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 투시도, 조감도 : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도, 단위 평면도

- 각층 천장 평면도 : 시공에 필요한 사항

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항

- 샷다, 핏트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항

- 각층 기둥․보 위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판류 등

- 기타 시공에 필요한 사항

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2) 토목

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 시방서

라) 도면 종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

3) 조경

가) 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 - 자재사용계획 - 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

다) 도면 종류

- 배치도 - 종단면도 및 횡단면도

- 평면도 - 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다) 설계 계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 공조장비 선정서(습공기선도에 공기상태 표기), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도 - 범례

- 도면목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 공조, 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항(엘리베이터 건축단면도 포함)

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

- 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 회선용량계산서, 전계강도계산서, 교환기용량계산서

- DVR 용량계산서

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 (블럭다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

7) 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증(해당시)

장애인․ 노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제10조의2(장애물 없는 생활환경 인증), 동법시행령 제5조의2(장애물 없는 생활환경 인증 의무 시설의 범위), 동법 별표 2의 2(장애물 없는 생활환경 인증 의무 시설) 장애물 없는 생활환경 인증에 관한규칙, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료 기준등 (국토교통부 고시 제2018-500호)

제5장 도서 납품목록

1. 일반 사항

건설공사의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시) 설계공모, 기본설계 등의 관한 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한지침(국토교통부 고시)에 맞도록 작성하여야 하며, 공공발주사 에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시) 계획설계, 기본설계, 실시설계 납품도서 목록은 아래와 같으며 발주청과 설계자 상호 협의를 통하여 단계별 도서납품 통합하여 일괄 납품 할 수 있다.

2. 계획설계 납품도서

1) 법규검토

2) 계획배치도 및 계획평면도

3) 분야별 계획 평면,단면, 입면도

4) 현장조사내용

주) 1. 상기내용이 포합된 계획설계내용을 3부 작성제출(A4,A3 협의)

3. 중간(기본)설계 납품도서

구분	설계 도서명	규격	수량	단위	공 종						비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신
1	기본설계보고서	A4	5	부							협의
2	측량보고서	A4	5	부
3	도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종
4	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
5	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	중요시설 (구조물)
6	시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	협의

주) 가) 발주기관과 수급인의 협의 후 표의 내용은 조정될 수 있다.

나) 기본설계보고서에 포함되어야 할 사항은 사전조사내용, 분야별 설계설명서, 공사개요, 교통동선분석, 향후 실시설계 방향 등 이다.

다) 전체적인 일정을 고려 계획설계와 기본설계, 중간설계, 실시설계를 일괄 합본하여 납품 할 수 있다.

라) 실시설계와 합본 납품 할수 있다.

4. 실시설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종					비 고
					건축	토목	기계	전기	통신
1	종합보고서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	공종별통합
2	도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
3	계산서 (각종용량계산서)	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
4	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
5	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	필요시
6	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
7	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
8	일위대가	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
9	공사시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
10	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯
11	구조계산서	A4	5	부	◯	◯				토목구조 해당시
12	장애물없는 생활환경 예비인증 도서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	공종별통합

주) 가) 종합보고서(A4) 5부

종합보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과 정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정 ․ 보완 지시사항 및 조치결과, 납품설계도서  목록 등 일체 기재하여 A4규격의 책자로 양면 인쇄하고 무선무사철로 좌철하여야 한다.

나) 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성 ․ 제출하여야 한다.

다) 조감도 및 보고서 내용을 저장한 USB를 제출하여야 한다.

라) 전체적인 일정을 고려 발주처와 협의 기본설계와 실시설계를 일괄 합본하여 납품 할 수 있다.

5. 도시계획시설(중복)결정 및 실시계획인가

구분	설계 도서명	규격	수량	단위	비 고
1	도시계획시설(중복)결정 총괄도	1/25,000	5	부
2	도시계획시설(중복)결정도	1/5000	5	부
3	지형도면고시도	1/5000	3	부
4	실시계획승인신청서	A4	3	부	협의
5	실시계획 승인서	A4	3	부	협의
6	기타 필요한 도서 및 서류	A4	3	부

주) 가) 추후 행정절차 이행 시 추가 필요한 자료는 별도 작성하여 제출하여야 한다.

나) 도시관리계획 수립지침을 참고하여 작성하고, 보고서 내용을 저장한 USB를 제출하여야 한다.

다) 인가를 위한 필요 시 기초조사, 교통성검토, 경관성검토 등 관련 검토서가 첨부되어야 한다.

제6장 관련서식

1. 보안 각서

보  안  각  서

1. 용 역 명 : 부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 완수예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20  년   월   일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술 분 야 :

성        명 :                   (인)

인천광역시장 귀하

2. 책임기술인 선임계

책 임 기 술 인  선 임 계

1. 용 역 명 : 부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

인천광역시장 귀하

3. 책임기술자 명단

설계용역 종합보고서 책임기술자 명단

◦ 용 역 명 :

◦ 용역기간 :

◦ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

기술 분야	설계참여기술자 (설계사, 감리사)						서명 (실명)
	성 명	직책	주민등록번호	자격종목 및 등록번호	참여기간	참여세부 수행내용

* 자격종목 : 국가기술자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록번호를 기재

* 수행내용 : 분야별 책임기술자 중심으로 주요시설물에 대한 수행한 핵심공법을 파악할 수 있도록 기재

* 주민등록번호 뒷자리는 -***으로 표기

4. 설계 검사원

설계 검사원

1. 용 역 명 : 부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(기본 및 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

인천광역시장 귀하

5. 주간 공정보고

주간 공정보고

◦용 역 명 : 부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

◦용역진행사항

구 분	전주 진행사항 (20 . . .~ 20 . .)	금주 예정사항 (20 . . .~20 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정 / 예정공정(%)을 표기 주간공정보고를 협 의에 따라 격주간으 로 변경할 수 있다.
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술인 :           (인)

인천광역시장 귀하

6. 월간 공정보고

월간 공정보고

◦용 역 명 : 부평역 환승센터 조성사업 기본 및 실시설계 용역

◦용역개요 :

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

◦용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비 고
첫째주		실시 / 예정 실행공정(%)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술인 :           (인)

인천광역시장 귀하

제7장 예정공정표

구 분	착수일로부터 15개월									비 고
	1,2	3,4	5,6	7,8	9,10	11,12		13,14	15
•현황측량
•기본 및 실시설계	계획설계		기본설계				실시설계			조감도 포함
					설계VE
•각종협의, 보고		착수보고		중간보고		기술심의			최종보고
									계약심사
•인.허가 협의								건축	협의
								실시계획	인가
•비 고	※ 심의, 자문등의 일정에 따라 계획기간이 조정될 수 있음