북삼어린이청소년도서관 건립공사 설계용역

설계 과업지시서

2025.  08.

	칠 곡 군
	세마을체육과

목    차

Ⅰ. 설계개요	2

Ⅱ. 일반사항	4

Ⅲ. 공통설계 지침	8

Ⅳ. 계획설계 지침	14

Ⅴ. 중간설계 지침	18

Ⅵ. 실시설계 지침	19

Ⅶ. 건축공사 설계지침	22

Ⅷ. 토목공사 설계지침	25

Ⅸ. 조경공사 설계지침	26

Ⅹ. 기계설비공사 설계지침	27

Ⅺ. 전기설비공사 설계지침	29

Ⅻ. 정보통신공사 설계지침	30

ⅩⅢ. 소방공사 설계지침	31

ⅩⅣ. 설계도서 작성 및 납품	32

【붙임 1】 실별 소요면적 현황(SPACE PROGRAM)

【붙임 2】 신축(증․개축) 예정지 현황

Ⅰ		설계개요

1. 용역명 : 북삼어린이청소년도서관 건립공사 설계용역

2. 목적

◦ 현재 개발 중인 칠곡 북삼도시개발사업구역 내 대규모 공동주택 건립으로 인한 인구증가 및 대구권 광역철도 북삼역 신설에 따른 유동 인구의 유입으로 다양한 교육 ․ 문화 인프라 구축으로 지역주민에게 최적의 독서문화 환경 제공 및 문화적 욕구 충족

◦ 지역 어린이 및 인근 대구𐄁구미권 어린이𐄁청소년도 이용이 가능한 어린이𐄁청소년 도서관을 건립하여 양질의 프로그램과 안전한 문화𐄁놀이공간을 제공함으로써 지역의 미래를 이끌어갈 어린이𐄁청소년이 자율적이고 창의성 있는 활동을 할 수 있는 전용공간과 문화 활동을 제공하고 칠곡군 호국평화 U벨트와 연계한 문화 프로그램 등을 운영하여 도서관 관광 자원화 추진, 현대적 환경과 시스템을 갖춘 도서관으로 모든 계층의 접근이 쉬운 독서환경 조성 및 주민의 문화 충족을 위한 복합문화공간으로서의 역할 확대

◦ 제4차 도서관발전계획에 맞춘 디지털 일상 향유 도서관, 미래 창의 인재 양성을 기본 방향으로 설정, 칠곡군 지역에 부족한 인프라를 -AR, AI, 로봇 체험과 상상, 제작(크리에이터 육성 등)- 도서관에 녹여 소통과 공감을 통한 나눔문화가 확산 될 수 있는 독서문화복지 구현

3. 사업개요

가. 대지 위치 : 경북 칠곡군 북삼읍 율리 북삼율리도시개발사업부지 내

나. 대지 면적 : 근린공원면적42,883㎡(건축가능 공간면적-2,901㎡)

다. 사업 규모

1) 규모: 3,279.0㎡(지하 1층, 지상 3층)

2) 주용도 : 교육연구시설(도서관)

3) 실별 소요면적 : [붙임 1] 참조

라. 예산 규모(건축, 토목, 조경, 전기, 기계, 통신, 소방 포함) : 금13,706,000천원(부가세 포함)

※ 사업규모 및 예산액 범위 내로 하는 것을 원칙으로 하되, 설계 연면적은 ±5%(건축면적은 제한 없음) 범위 내에서 조정 가능하며, 각 실면적(공유면적 포함)은 기능을 수용하는 범위 내에서 자유롭게 조정할 수 있다.

4 과업범위

가. 본 용역은 기본(계획, 중간)설계 및 실시설계를 수행하여야 하며, 설계 범위는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 소방, 통신부문 등의 제반 분야를 포함한다.

나. 본 공사 준공 이후 건축행정시스템(세움터) 건축물관리대장 등재 업무를 협조하여야 한다.

라. 녹색건축(일반등급), 제로에너지건축물 인증(4등급) 및 설계안전성검토(DSF)와 관련하여 해당 업체를 선정하여 인증 조건 및 기준에 충족할 수 있게 설계하여야 한다.

마. 신재생에너지 설계 도입: 지역적 특성과 여건을 고려하여 별도 발주된 해당 설계 용역자(기계설비, 전기 등)와 협력하여 태양광, 풍력 등 신재생 에너지시설 설치에 따른 구조계산 등의 설계를 지원하도록 한다.

바. 「녹색건축물 조성 지원법」제14조에 따른 에너지 절약계획서 제출 대상으로 「건축물의 에너지절약 설계기준」을 검토·반영하여야 한다. 설계 완료 시에는 발주청에 요청하여 에너지 절약계획서 검토를 받아야 하며, 검토 수수료 발생 시 발주청에서 부담한다.

사. 장애물 없는 생활환경(B.F) 인증 대상이므로, 장애인 및 노약자들이 사용하기에 불편함이 없도록 관련 기준에 적합하게 설계하여야 한다.

아. 녹색건축, 제로에너지, 장애물 없는 생활환경(B.F) 등의 인증에 대하여 수수료는 발주청이 부담하는 것으로 한다.

자. 발주청의 중간설계 협의회 및 사용자 측(운영자, 이용자, 지역민 등) 설계설명회 등 모든 협의회 관련 서류 작성과 브리핑을 수행하고, 심의(협의)된 결과를 정리하여 본 설계에 적극 반영한다.

차. 적절한 설계와 효과적 사용을 통해 범죄 유발 요인을 근본적으로 제거하는 셉테드(CPTED) 기법을 설계에 반영한다.

카. 건축 인허가, 설계협의회, 설계경제성(VE) 검토, 설계자문, 공사발주를 위한 관련 자료 제출 등에 적극 협조하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 발주청의 요구사항을 반영하여야 한다.

타. 우리 청에서 추진하는 감성적인 도서관 공간 조성 계획이 잘 반영될 수 있도록 협조하고 아이디어를 제공하여야 한다.

5. 용역기간

본 설계용역 기간은 착수일로부터 240일 이내로 한다.

(계획설계 30일, 중간설계 60일, 실시설계 120일, 설계협의·심의 30일)

※ 각종 예비인증 등 행정절차 이행으로 인해 용역 기간이 지연될 경우에는 용역기한 내 관련 신청서를 접수하여야 하며, 심의 및 지적 내용에 대해서는 설계도서를 보완하여 최종성과품을 납품한다. (용역기한 내 신청서 접수 시 과업 수행 인정)

6. 설계방향

가. 본 도서관의 건축기획보고서 및 기타 자료를 충분히 검토하여, 사용자들의 의견이 적극 반영될 수 있도록 한다.

나. 도서관의 독창성 및 비전, 지역문화 시설로써의 상징성 등을 제시할 수 있도록 계획한다.

다. 이용자들의 기호와 정서, 지적 창의성 발달 등에 도움이 될 수 있도록 구조물의 매스(Mass), 배치, 입면, 평면 형태 및 색상 등을 계획한다.

라. 주변 환경과 조화를 이루며 독서 분위기를 제고할 수 있도록 외부공간, 녹지, 조경, 담장, 옹벽 및 휀스 등 옥외구조물을 계획한다.

마. 독서교육의 원활한 수행이 가능하고 향후 시대 여건 변화에 능동적으로 대응할 수 있는 다양한 공간으로 설계한다.

바. 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용)은 지양한다.

사. 지구환경문제와 새집증후군 등에 능동적으로 대처하고 예방할 수 있는 환경친화적인 도서관 시설로 설계한다.(건축물의 장수명화, 친환경자재, 신․재생에너지, 고효율기자재 사용, 생태 면적률 적용 등)

아. 운영자를 비롯하여 도서관 시설을 이용하는 모든 사람들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 시설로 설계한다.(엘리베이터, 옥외경사로, 난간, 장애인 전용주차장 및 기타 관계 법령에 의한 설계반영 검토보고서 작성)

자. 지진에 대비하여 관계 법령에 적합한 내진설계를 적용한다.

차. 시공 중 발생하는 소음, 분진, 진동 등 환경 오염원의 최소화 방안을 모색하고, 공사차량 진출입으로 인한 부지 주변 교통영향 최소화 방안을 마련한다

카. 도서관 시설에 필요한 기능확보를 위한 세부 사항은 「2024년도 공공도서관 건립 운영 매뉴얼(문화체육관광부)」 및 관련 자료들은 수집․분석하여 활용한다.

Ⅱ		일반사항

1. 일반사항

가. 본 용역은 국토교통부 고시 제2020-635(2020. 9. 4.)호의 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무 범위와 대가기준」에 의한 [별표 4] 건축설계에서의 도서작성 기준에 의거 추진 단계별(계획·중간·실시설계) 제3종(복잡) 중급 이상의 설계도서를 작성한다.

나. 본 설계는 국토교통부 제정 각종 시방서, 건설공사표준품셈과 본 설계지침에 의거하여 작성한다.

다. 모든 자재는 K.S제품을 사용하여야 하며, K.S 표시품이 없는 자재는 국산 최우량품 또는 친환경인증자재를 사용한다.

라. 조경공사 설계 시에는 조경산업기사 이상 또는 동등 자격 소지자가 설계하여야 한다.

마. 용역수행 내용

1) 현황 조사

2) 계획 설계도서 작성 및 설명(심의회 포함)

3) 중간 설계도서 작성 및 설명(심의회 포함)

4) 실시 설계도서 작성 및 설명(공청회 포함)

5) 스케치 모델링(기본 업무에 포함) 및 조감도 1컷(기본 업무에 포함)과

투시도(건물투시1, 실내투시5) 작성

6) 주요자재 선정 검토서 작성

7) 내·외부 색채계획 및 인테리어설계

8) ICT가 반영된 정보화 도서관 계획 반영

9) 기타 발주청에서 계약서 또는 과업지침서에 정하는 사항

2. 행정사항

가. 착수계 제출 시 다음의 제반 서류를 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 사업책임기술자 선임계

- 재직증명서, 이력서, 기술자 면허수첩 사본, 경력증명서 첨부

3) 설계 예정공정표

- 분야별 세부공정 계획서 및 업무흐름도 포함

4) 분야별 참여기술자 명단

- 재직증명서, 이력서, 기술자면허수첩 사본, 경력증명서 첨부

5) 보안각서

6) 과업수행계획서

- 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

- 분야별(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 색채 등) 업무범위와 책임한계

- 설계품질 보증계획

- 각 분야별 인력투입계획

- 분야별 세부 과업수행 절차

- 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

나. 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 착수계 제출 후 발주청과 협의하여 정기적인 업무협의회(월2회 이상)를 실시하며, 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

가) 조사 및 자료 수집의 완료 또는 공법 결정 시

나) 기본(계획, 중간)설계 완료 시

다) 실시설계 완료 시(유지관리 계획을 포함)

라) 각종 협의 및 심의 자료 작성 완료 시

2) 계약상대자는 매주 공정보고 및 매월 1회 이상 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준으로 공정보고서를 작성하여 발주청에 보고하고, 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

가) 주간공정보고: 매주 금요일

나) 월간공정보고: 매월 말일

3) 설계설명·심의회의 내용 반영 등 주요 업무는 사전 승인을 받도록 하며, 과업수행은 예정공정표에 따라 성실히 수행하여야 한다.

다. 관련기관 인․허가 및 협조

1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축허가에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업부지 내․외 지하 지장물의 매설 여부(도시가스관, 상․하수도관, 기타) 및 도시가스 공급가능여부, 전기․전화 공급지점 등을 계약상대자 책임하에 관련기관과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의 결과를 발주청에 보고하여야 한다.

3) 계약상대자는 본 과업의 인․허가 사항에 대하여 발주청과 협의하여 가능한 용역기한 내에 건축승인 등 모든 행정절차를 완료하도록 한다.

라. 하도급의 범위

1) 계약상대자는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 시험, 지반조사, 측량 등 이와 유사한 작업

나) 계획설계 연구와 관련된 업무

다) 적산 및 견적업무, 구조계산

라) 기타 발주청이 인정하는 업무

3) 하도급은 관계법령에 의거 적격자에게 하도급 하여야 하며, 「건설기술진흥법」 제35조제4항 및 동법시행규칙 제31조의 1항에 의거 설계용역의 하도급을 체결하였을 경우 하도급 기술참여자 명부를 작성하여 즉시 발주청에 통보하여야 한다. 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 져야한다.

마. 타 계약상대자와의 업무한계

다수의 계약상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 기간 내의 과업을 수행하여 서로 간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 대표자 책임하에 계약상대자 간의 업무한계를 명확히 구분하여야 한다.

바. 과업의 변경 등

본 과업수행 중 발주청의 사업계획 변경 등에 따라 변경 사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산 처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있다.

3. 유의사항

가. 용역자는 발주청에서 제시하는 기본사항(제원, 위치, 계획, 개요 등)과 설계 유의사항을 충분히 숙지한 후 관련 자료를 수집하여 본 과업의 성과가 설계에 집약될 수 있도록 한다.

나. 용역자는 각 분야별 설계에 있어서 특수성 및 중요성이 요구되는 것은 그 원인을 분석하여 담당자와 협의 후 경제적이고 합리적인 방안을 채택하여 설계한다.

다. 용역자는 계약일로부터 7일 이내에 착수하여야 하며, 착수계 등 제반 서류를 제출하고 진행 사항을 수시로 담당자에게 통보한다.

라. 용역자는 설계를 수행함에 있어 완료되거나 수정 설계 시에는 기계, 전기, 통신, 소방 설계 용역자와 수시로 협의하여야 한다.

마. 설계심의 및 보완 등

1) 용역자는 각종 설계와 관련된 협의회 및 심의회에 참석하여 설명은 물론 심사자료를 작성하고, 보완요구 사항이 있는 경우는 즉시 보완 조치한다.

2) 제출된 설계도서는 발주청이 관계 기관과의 협의를 거쳐 확정될 때까지의 지적사항과 공사시행 과정에서 설계변경(설계서의 내용이 공사 현장과 상이, 누락․오류 또는 상호 모순 등) 사항이 발생되는 경우와, 설계자에 의해 발생한 수정·보완 사항에 대하여 발주청의 요구가 있을때에는 설계용역자 부담으로 즉시 수정·보완하여야 한다.

바. 설계도서의 저작권

본 설계 건에 대해서는 설계자가 납품한 설계도서 제출물은 발주처가 사용할 수 있다.

사. 책임 및 하자보증

1) 용역자(건축사)는 일체의 제출 도서에 대하여 책임을 져야하며, 시공도 중 설계도서가 부합되지 않을 경우 현지조사 및 시험 등의 요구가 있을 시 시행하여야 하며, 이에 따른 발생 비용은 설계자가 부담하여야 한다.

2) 납품 검수 후라도 설계상의 결함 또는 변경 사항은 반드시 수정 요구에 응하여보완하여야 한다.

3) 제출된 설계도서에 대한 하자 즉 공사시공 및 준공 후 설계구조의 불안전으로 발생하는 하자와 설계 후 공사 물량의 착오로 인하여 손해가 있을 시는 설계자로서의 의무와 필요한 조치를 이행하지 않으므로 발생되는 민․형사상의 책임을 진다.

아. 계약의 해제

용역계약 체결 후 과업 진행 중 다음 경우에는 발주청이 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며 계약상대자(건축사)는 이의를 제기할 수 없다.

1) 계약서상의 설계도서 작성 지침 및 계약 후 제시하는 제반 자료의 지시 사항을 고의 또는 임의로 불이행했을 경우

2) 계약상대자(건축사) 개인의 특수사정, 무성의, 불성실 등으로 지정기일 내에 도저히 납품 가능성이 없다고 예상될 경우

3) 계약상대자(건축사)의 고의 또는 부주의로 외부에 작품 내용을 공개하여 발주청의 사업 추진상 물의를 야기시켰을 경우

자. 발주청의 사정으로 건축승인이 지연될 경우 별도 협의에 의하여 추후 건축승인을 완료하여야 한다.

차. 용역을 계약할 때의 추정공사금액보다 용역완료 후 추정 공사금액 증액으로 인한 설계용역비 정산처리는 불가함.

Ⅲ		공통설계 지침

1. 일반사항

가. 부지 내의 모든 시설에 관한 계획은 종합계획을 수립 후 이에 따라 세부적인 실시계획이 작성되어야 한다.

나. 각 시설의 설계는 안전성, 경제성, 시공의 난이도 및 기능에서의 합리성이 검토되어야 하며, 가능한 조형미의 구현을 위한 노력이 집중되어야 한다.

다. 공사의 집행계획에 소요되는 자재, 장비 및 노무 수급 등의 계획이 동시에 검토되어야 하며, 합리적이고 구체적인 계획이 되도록 하여야 한다.

라. 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 합치되어야 하고 해석이 용이하도록 작성하여야 한다.(설계도서, 시방서, 각종 계산서 등)

마. 예정공정표는 PERT 또는 CPM 기법으로 설계원도 및 청사진에 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축소하여 제출한다.

2. 사전조사에 관한 사항

가. 정확한 주변 현황조사

1) 부지 입지 조건 및 주변 현황조사

2) 발주청으로부터 제공받은 지반조사보고서 검토 및 적용

나. 기상조건 조사

1) 일조 및 기온습도

2) 풍향 및 풍속

3) 강우 및 강설량

다. 교통관계

1) 도로 및 교통량

2) 주차장

3) 중량적 운반수단 검토

라. 급·배수 계통의 조사

1) 급수 원의 조사(상수도 분기 예상지점의 관경, 수압 등)

2) 배수 및 오물처리 계통(해당 지역의 상․하수 시설 기본계획 포함)

마. 지역 조건에 관한 조사

1) 지역의 위치, 형태 및 범위

2) 인근 시설물

3) 대지 내 기존 시설의 유무

4) 지역계획에 관한 사항(도시계획 상 용도지역 관계)

바. 사용자재 및 장비의 공급원 조사

1) 골재(자갈, 모래 등) 및 석재의 채취원 현장에 가장 근접하고 저렴한 채취원 및 골재상

2) 건설장비, 동원계획

3) 기타 사용 자재의 공급원

3. 건축물의 조형미 구현에 관한 사항

가. 건축물은 기능을 우선적으로 고려하되 미적으로 설계하여야 하며, 품질을 확보하기 위한 견실한 설계로 부실공사를 예방할 수 있도록 최선의 노력이 집중되어야 한다.

나. 입면계획의 조형미

1) 균형과 통일성

2) 변화성 있는 계획

다. 특수성을 살린 건축 계획

1) 기능에 따른 특징

2) 상징적 표현(Land Mark)

라. 마감 재료의 적정한 선택

1) 색채의 조화

2) 질감의 적정

3) 내구성이 있는 재료 선택

마. 주변 환경 여건과의 조화

1) 건축 계획의 조화성

2) 조경 계획의 적정성

4. 시설배치 및 조경계획 등에 관한 사항

가. 자연 여건을 최대한 활용한 계획 수립

1) 불필요한 절․성토의 지양

2) 옹벽 등 불필요한 구조물 설치의 억제

3) 수목, 암석 등 기존 조경재의 활용

나. 건물 및 주변 환경조건에 부합하는 조경계획 수립

1) 소재 선정 상 타당성 여부

2) 식재 밀도

3) 계절적 감각 검토

4) 토질 및 기후의 적용성 검토

다. 부지 내 각 시설의 합리적인 배치

1) 시설의 활용에 편리한 배치 계획

2) 일조권 등을 고려하여 배치하고 건물 간 및 인근 시설과의 적정거리 확보

3) 방화, 피난 등을 위한 옥외 공간 확보

5. 건물 계획에 관한 사항

가. 사용상 적정한 규모의 실소요 판단

1) 수용인원 판단

2) 수용장비의 크기, 용량, 수량 판단

나. 건물 사용에 편리하기 위한 건물 각부 치수 결정(인체 및 사용기기, 설비 치수에 부합)

1) 출입구 크기의 적정화

2) 천장높이 및 창문 높이 검토

3) 각종 시설의 크기 및 설치 위치 검토(부속실, 철물, 전원조절․연결장치, 냉난방, 배관용, 덕트 등)

4) 각부 치수의 표준화, 자재의 규격화

다. 이용에 합리적인 시설 배치(기계, 장비 등)

1) 가급적 사용 동선 단축

2) 사용자가 편리한 동선 계획

3) 요구 기능에 따른 동선의 분리

4) 상․하층을 연결하는 수직 동선의 검토

라. 수용인원 및 건물 기능에 적정한 규모의 위생설비 확보

1) 사용자의 성(남․여)에 따른 실의 분리

2) 적정수의 대․소변기, 음수기 등과 이에 따른 공간 확보

3) 오수처리 설비 위치 검토

4) 환기시설 계획

마. 사용 인원의 편리한 후생시설 확보

1) 실내·외 휴게공간 배려

2) 부지 주변의 휴게공간 연계

바. 건물용도 및 규모에 적정한 내․외장 재료의 선택

1) 재료의 내구성(재질, 강도 등) 검토

2) 재료의 색상, 질감 및 사양 검토

3) 재료의 내연 및 내구성

4) 재료의 경제성

사. 비상시 대피시설의 확보

1) 피난시설(피난계단, 통로, 지하실, 방화문, 비상구 및 옥외 공간)

2) 방화상 필요한 구조 및 재료의 선택

3) 오물 방지시설 계획 검토

아. 건물 외관 계획에 관한 사항 검토

1) 건물 기능에 적합한 외관의 선택

2) 주변 환경과 조화되는 계획

3) 가급적 조형미의 구현

자. 사용에 적합한 통로시설 확보

1) 계단(계단의 위치, 폭, 단 너비 및 높이)

2) 복도 및 통로(복도의 폭과 보행거리 검토)

차. 에너지절약을 위한 건축 계획

1) 단열효과의 제고를 위하여 외벽, 바닥 및 천장의 구조 및 재료 검토

2) 가능한 자연채광과 환기를 고려한 적정면적의 창문설치

카. 창호설치 계획의 적정화

1) 실 기능에 맞는 창호재의 결정

2) 채광 및 환기를 위한 개구부 면적의 확보

3) 창호의 개폐 방식, 방향, 크기의 적정화

4) 적정한 종류 및 크기, 창호 부속 철물의 설치

5) 창호용 재료의 규격품 사용 명시

6) 창호의 개폐 시 밀폐될 수 있도록 정밀 설계

7) 창호의 재질은 단열, 결로 등을 방지할 수 있는 기능성 창호로 설계한다.

6. 누수 및 결로 방지 대책에 관한 사항

가. 지하수압 적용에 관한 사항

1) 지하수 및 수압 검토

2) 방수재료 및 공법의 적정성 검토

3) 지하 수위를 낮추는 방안

4) 방수층을 통과하는 각종 배관 주위 방수 대책 강구

나. 우수 및 침수에 따른 대책

1) 지붕 및 외벽 부분에 대한 우수, 침수 대책검토(방수재료 및 공법선택)

2) 개구부 주위 누수방지 대책

3) 돌출 부분 등 물 끊기 처리

4) 화장실, 욕실 등 물 사용 실에 대한 방수 대책

다. 결로 방지를 위한 검토

1) 외벽의 실내에 면한 부분의 구조(노점온도 이상이 되도록 처리)

2) 열교현상 방지 대책

7. 건축구조의 안전성에 관한 사항

가. 지반 상황에 적합한 기초구조 선택

1) 적정한 지내력의 판단

2) 기초의 구조 및 시공 방법 결정

3) Pile의 종류, 규격, 품질, 소요 수량 검토

나. 구조물에 사용하는 하중의 적정한 판정

1) 고정하중

2) 활하중

3) 풍압 및 적설하중

4) 수압, 토압, 기타

5) 내진설계: 지진대재대책법 제14조 및 건축법 제48조의2 규정에 따른 건축물

다. 구조내력 상 필요한 내력벽의 설치 검토

1) 내력 상 필요한 벽량의 확보

2) 내력벽의 두께 및 길이

3) 내력벽의 구조 검토

라. 경제적이고 시공이 용이한 구조의 선택

1) 구조상 불필요한 부분의 소거 및 과대한 부재 단면의 축소 검토

2) 시공 및 구법이 용이한 구조 계획

3) 구조의 안전에 필요한 부재의 최소 단면 결정

마. 구조물의 신축에 대비한 신축줄눈 설치

1) 구조 연장이 긴 경우와 이질재 간의 접합부, 기타 필요한 경우의 줄눈 설치

2) 설치 위치에 적합한 줄눈 종류 결정

8. 건축설비 계획에 관한 사항

가. 장비의 종류, 용량 결정

1) 부하계산 상의 외기 및 실내 온․습도의 적정한 선정

2) 부하계산에 의한 용량 결정

가) 기기별 이속 계수를 적절히 감안하여 경제적인 용량이 되도록 설계

나) 각 기기는 최대의 효율을 낼 수 있도록 설계

3) 기계실의 규모는 유지관리가 용이하도록 적정한 크기(면적)를 확보

나. 공해방지 대책에 관한 사항

1) 각종 기기의 소음과 진동에 대한 방지책 강구

2) 열원기기에서 배출되는 매연에 대한 집진설비 검토(환경보호법 참조)

3) 오수처리 방법 및 기능검토(오물청소법 참조)

다. 방재 대책에 대한 검토

1) 수조 노출 배관 계통에 대한 보온 대책

2) 전기배선 누전으로 인한 방재 대책

9. 설계도면 작성에 관한 사항

가. 각종 표기, 기호 및 방법은 관계 기준에 맞도록 표기한다.

나. 시공 및 적산이 용이하도록 각종 상세도를 작성한다.

1) 각종 치수의 정확한 명기

2) 각종 사용 자재의 명칭 기입

3) 각종 자재의 규격, 품질, 형태의 표시

4) 철근 배근도에 있어서 절곡근의 위치 장착 및 이음길이 위치 등을 치수로 표기

5) 각종 설비 계통의 명확한 표시

6) 조경의 수종, 규격, 위치 등을 정확히 표시

다. 설계도서 상 분야별 설계 책임자의 서명 또는 날인

10. 시방서 작성에 관한 사항

가. 시방서는 일반시방서와 특기시방서를 구분 작성한다.

나. 특기시방서는 일반시방서에 명시되지 않은 다음 사항을 포함 작성하여야 한다.

1) 재료의 규격, 품질, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항

2) 각종 자재의 설치 방법(가공, 조립, 부착 등)에 관한 사항

3) 각종 가설물(가설, 건물, 울타리, 흙막이공법 등)에 관한 사항

4) 각종 구조공법(말뚝박기, 배근, 용접 등)에 관한 사항

5) 재료의 배합과 양생에 관한 사항

다. 시방서 내용은 본 공사에 해당되는 부분만 작성한다.

11. 현장인계에 관한 사항

설계도서를 납품한 후 발주청 감독자에게 도근점, T.B.M등을 인계한다.

Ⅳ		계획설계 지침

1. 계획 설계도서 작성

가. 설계 방향

1) 발주청에서 제시하는 과업 내용과 각종 자료를 분석하고 제반 요소에 적합한 설계안을 제시하여 추후 중간 및 실시설계 용역을 수행할 시 기본이 되도록 하여야 한다.

2) 본 용역 시행 중 진행 과정을 발주청과 수시로 협의하여야 한다.

3) 본 용역을 수행함에 있어서 건축법 및 기타 제반 법규와 설계기준 및 과업지침서에 합당하여야 한다.

4) 용역 과정에 있어서 본 지침서 및 일반사항에 의하여 작성하되 미비 또는 의문 사항이 있을 시 발주청과 협의하여야 한다.

나. 관련법규 검토

- 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙

- 내진설계기준

- 녹색건축물 조성 지원법

- 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙

- 건축법

- 건설산업기본법

- 건설기술진흥법

- 도로법

- 소방법

- 주차장법

- 환경보건법

- 도서관법

- 2024년도 공공도서관 건립 운영 매뉴얼(문화체육관광부 고시)

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

- 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙

- 공중화장실 등에 관한 법률

- 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법

- 주택건설기준 등에 관한규정

- 안전한 실내건축 가이드라인(국토교통부 고시)

- 범죄예방 건축기준(국토교통부 고시)

- 기타 도서관 시설물 등에 관련된 법률 및 규정 준수

다. 부지 현황조사

1) 도서관 부지를 포함한 주변 부지의 자연환경 조사

(가) 지형, 지세

(나) 토질, 지반

(다) 식생, 수리, 홍수

(라) 조망, 시야의 조사

2) 인문환경 조사

(가) 이용자․운영자의 요구, 태도, 사용 규범, 행위․활동의 조사

(나) 사회계층의 조사, 사회의 욕구 조사

(다) 조각, 회화, 음악적 특유성의 조사

(라) 정치․경제적 시대성 조사 및 시대의 유행 조사

3) 기반시설 조사

(가) 도로 및 차량 동선의 조사

(나) 보행자 도로 및 보행 동선의 조사

(다) 파출소, 병원, 우체국 등 도서관과 연결되는 도시의 사회적 기반시설 조사

(라) 상․하수, 오․폐수 등 도서관과 연결되는 도시의 기술적 기반시설 조사

(마) 공원 등 사용할 수 있는 주변 사회시설의 조사

라. 설계기준 및 여건분석

1) 교육과정 및 교수 – 학습 방법 분석

- 도서관 교육과정 운영 방식

- 교수·학습 형태의 분석

․ 이용자의 행위․활동에 의한 학습형태 및 학습공간의 규모 산정

․ 학습공간의 관련성 분석

- 특별활동의 분석

․ 특별활동에 따른 지원시설의 규모 산정

2) 사용자 요구사항 적용

- 최근 3년간 우수시설도서관 사례조사 및 벤치마킹을 통한 분석

3) 주변 환경 분석

- 대상지역의 위치 및 세력권 분석

- 대상지역의 지형, 소음, 전망 등 분석

- 동선의 분석

4) 지역사회에 개방 가능실과 이용자와 운영자의 전용 시설 분리

- 도서관 시설을 이용한 개방 프로그램 분석

․ 특기․적성교육

․ 평생교육(지역주민 개방)

- 교수·학습 방법에 의한 필요 공간 분석

5) 이용자 동선 분석

- 인근 시설(근린공원)과의 동선 계획 수립

- 도서관 내에서 이용자의 동선 추적

- 이용자, 운영자 및 자동차 동선

- 보차도 분리

6) 생태도서관 조성 방향 제시

- 생태환경의 제공으로 도심지 환경 부하를 감소시키는 도서관

- 자연환경을 도입하여 녹지공간을 제공하고 생태학습 공간을 포함한 도서관

- 이용자, 운영자, 지역민의 학습 ․ 여가 ․ 휴식 등의 생활공간을 제공하는 도서관

- 지역사회와 연계되어 환경친화적 공간의 제공과 복합문화시설로의 역할을 하는 도서관

7) 에너지절약 도서관

- 도서관 건물의 에너지절약을 위한 전반적인 사항 제시

- 대지 여건을 고려한 효율적인 에너지 이용 방법 분석

8) 건강한 실내 환경 조성

- 환경기준에 적합한 건강하고 쾌적한 교육환경 조성 방안 고려

- 사용 자재 및 시공 방법 등 실내 유해화학물질 발생 저감 방안 고려

- 자연채광, 환기, 통풍 등 고려

9) 기타

- 도서관에서 사용하는 물의 효율적인 사용과 안전한 물 공급이 이루어질 수 있는 도서관 건축의 방향 제시

- 실내 및 옥외 공간의 무장애 공간계획

- 건물의 형태 및 동선상의 무장애 계획

- 기타 관련 법규 검토 등

마. 기본구상

1) 기본방향

- 실의 규모 결정

- 동선의 흐름에 따른 실의 연관관계 결정

- 동선에 따르는 실의 위치설정

- 여가 활동에 따르는 외부공간의 결정

- 토지 내의 건물의 축 선정

- 지역사회 시설로서의 도서관 시설계획 등

2) 기본 및 모듈의 설정

- 교실형에 따른 실의 가로 및 세로의 길이

- 이용자의 활동에 의한 외부공간의 크기 선정

- 실내 시설물의 크기

3) Zoning 계획

- 부지 내 도서관 이용을 고려한 토지이용(안)을 선정

- 건물의 조닝 계획을 수립하고 도서관 운영 방식의 변동에 대응할 수 있도록 계획

4) 건물의 크기 및 형태

- 기존 건물 배치를 충분히 고려한 토지이용(안)에 건물의 형태와 크기에 관한 위치를 고려하여 3가지 기본구상(안)을 제시

- 각 대안별 기본방향 및 기준에 견주어 평가하여 1개안을 선정

5) 기본구상 협의

- 기본구상 및 연구 전반 협의

6) 건물의 배치

- 배치계획 : 건물 및 옥외 공간 배치(차량, 보행자 동선 표기)

- 평면계획 : 각층별 평면도 작성 및 치수 기입

- 입면계획 : 4방향 입면도 작성 및 주요 외장재 기입

바. 설계에 필요한 모든 자료를 조사, 수집하여 적절한 계획안을 도출하고, 설계안에 대한 설계설명서를 작성하여 발주청과 협의 후 결정한다.

2. 계획 설계도서 납품

가. 계획설계 보고서 5부

나. 계획 설계도서 일체 5부

다. 계획설계설명회 자료 각 20부

라. 모형(Sketch 또는 Study Model) 1점(발주청과 협의하여 생략 가능)

☞ 위 “가~라”까지의 제출물은 사정에 따라 달라질 수 있음

Ⅴ		중간설계 지침

1. 중간 설계도서 작성

가. 설계 방향

1) 계약상대자는 사전 조사 및 기본계획 단계에서 발주청에 제출․승인된 결과에 의하여 다음과 같이 중간설계를 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 발주청이 승인하기 위하여 요구하는 합리적인 기본(계획)설계안을 준비하여 제출(지역․지구에 따른 건축법규 분석과 추정 공사비 산출 포함)하여야 한다.

3) 외벽, 지붕, 구조, 설비 시스템과 실의 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야 한다.

4) 설계 요구 조건을 만족해야 한다.

나. 과업 내용

1) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 파악

나) 현지 조사 : 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

다) 관련 시설의 사전 조사와 수요자 요구사항 조사 및 협의

라) 유사사례 및 관계법령 조사

마) 각종 설계협의

바) 관련 기관 또는 부서와의 협의

2) 조건 설정

가) 설계 조건의 설정

- 요구 성능 확인

- 법령 및 기타 제약 조건의 정리

- 안전 성능의 설정

- 공사 예산의 파악

나) 설계 방침의 설정

- 설계 개념의 확립

- 개략 시방서의 설정

- 사용 재료 및 기기 등의 설정

다) 비교 및 검토

- 성능면에서의 기능 검토

- 설계 이념․의장 및 구조 형식 등의 검토

- 공사비 및 시공성 검토, 사용기기, 재료 등 검토

- 유지관리 상의 검토

- 시방, 구조 방식, 설비 방식 등의 종합적 검토

- 지하 매설물(상하수도, 한전, 가스 등) 이설 및 보강공법 비교 검토

라) 종합화

- 기능 배치 계획의 선정

- 공간 구성 계획의 선정

- 공사비 배분 계획의 선정

- 동선 계획의 선정

- 방재 계획의 선정

- 시설 배치 계획의 선정

- 평면, 입면, 단면 계획의 선정

- 구조 계획의 선정

- 내외 환경 계획(조명, 소음, 방진, 공조 등)의 선정

- 조경 계획의 선정

- 각종 설비(전기, 급․배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 특수설비, 냉난방설비 등)계획의 선정

- 신․재생에너지 이용계획의 선정

- 수요자의 요구사항 종합 및 선정

- 토사 운영계획, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계측 포함), 포장계획, 상․하수도 계획 선정

2. 중간 설계도서 납품

가. 중간 설계도서 일체 5부.

나. 중간설계심의회 자료 각 20부.

다. 색채계획서 자료 각 8부.

라. 모형(Sketch 또는 Study Model) 1점

마. 가~라”까지 내용이 포함된 CD 1매.

☞ 위 “가~라”까지의 제출물은 사정에 따라 달라질 수 있음

Ⅵ		실시설계 지침

1. 실시 설계도서 작성

가. 설계 방향

1) 계약상대자는 기본설계(계획+중간)를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 실시설계를 수행하여야 한다.

2) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대 시설을 설계에 포함하여야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리 방법을 제시한다.

3) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전관리에 관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

4) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍․혹서․혹한 등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 산정하여야 한다.

5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조계산서, 공사비 내역서, 발주청이 승인하는 공사예정공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

나. 과업 내용

1) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 상세한 파악(조건 파악)

나) 현지 상세 조사 및 확인

다) 관련 시설 상세 조사와 수요자의 요구사항 확인

라) 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

마) 특수 공법 부분의 상세 조사

바) 각종 법령 수속에 대한 협의

2) 조건 설정

가) 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

- 각 부분의 요구 성능 확인

- 법령, 기타 제약 조건의 각 부분 파악

- 각종 하중 조건 및 해석 기법 설정

- 각 설비의 요구 성능 확인

나) 공사비의 파악

다) 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

라) 기기류 배치 및 사용 방식의 결정

마) 배관․배선 등의 계통 및 경로의 설정

3) 비교·검토

가) 각 부분 기능의 검토

나) 공간 표현의 검토(형태 및 사용 재료의 검토)

다) 공사비 및 시공 기술의 검토

라) 각종 설비 방식의 검토 및 유지관리에 관한 검토

마) 사용기기 및 사용 재료의 검토

바) 관계 법령 등의 조합 및 검토

4) 종합화

가) 외부 및 내부 공간 설계

나) 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

다) 평면, 단면, 입면 및 상세설계

라) 공사비 예산과의 조정

마) 방재 설계, 응력 해석 및 구조 설계

바) 색채계획의 수립

사) 신․재생에너지 이용설비 계획의 검토 조정

아) 사용 재료, 사용기기 및 사양 결정

자) 수요자의 요구사항 결정

차) 각종 설계 등의 조정

다. 재료 선정 기준

각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상 질감, 무늬 등이 적합한 재료를 선택하되 다음 사항에 유의한다.

1) 경제성을 고려할 것

2) 색채의 조화 및 통일성을 기할 것

3) 내구성 있는 재료를 선택할 것

4) 유지보수가 용이 한 재료를 선택할 것

5) 질감의 적정성을 기할 것

라. 각부 재료

1) 외벽재료

외부 색채와 질감 및 미관을 고려하고 영구적인 재료를 선정한다.

2) 내부바닥

경제성, 소음, 위생 상태, 관리상 적정한 것으로 선정한다.

3) 내벽재료

각실의 용도 및 특성을 고려하여 경제성 있는 재료를 선정한다.

4) 천정재료

실의 기능에 따라 흡음성을 고려하여 선정한다.

5) 창호재료

에너지효율등급 성능을 만족하여야 하며, 알루미늄 및 플라스틱 이중창 또는 커튼월을 비교·검토하여 단열성과 기밀성 등을 고려하여 선정한다.

6) 방수 및 단열재료

내구성, 시공서, 경제성 등을 고려하여 선정한다.

2. 실시 설계도서 납품

Ⅻ. 설계도서 작성 및 납품(2-다. 최종성과품 종류 및 납품 수량) 참조

Ⅶ		건축공사 설계지침

1. 부지 활용 계획

가. 부지는 주차장과 건축 대지로 구분하고, 계획 부지의 고․저차는 현장 여건 및 주변 상황 등을 감안하여 계획한다.

나. 부지가 효율적으로 활용되도록 건물, 주차장, 옥외 공간 등을 계획하되, 향후 변화에 대응할 수 있도록 종합적(Master Plan)으로 계획한다.

2. 배치 계획

가. 출입구는 주변 도로 여건, 이용 시 안전도, 부지의 활용, 건물배치 등을 감안하여 위치를 결정하여 설치한다.

나. 주변 시설(근린공원)과 단절되지 않게 커뮤니케이션을 고려하여, 자연스럽게 조화를 이룰 수 있도록 계획한다.

다. 건물은 대지의 향, 일조 및 풍향 등을 고려하여 적절히 배치한다.

라. 옥외 공간과 실내 공간은 유기적으로 연계되도록 계획하고, 실의 기능(열람실, 자료실, 문화교육실, 관리 및 공용공간 등) 및 사용성을 고려하여 영역을 분리하여 배치한다.

마. 주변도로 등 소음과 접하는 부분에는 녹지 등 완충지역 또는 방음시설을 계획한다.

바. 방범 및 이용자 지도․관리 면에서 사각지대가 생기지 않도록 각 시설을 배치한다.

3. 동선 계획

가. 이용자, 운영자, 외래 방문자 등 동선을 분리하며, 사람과 차량 동선이 혼재하지 않도록 계획한다.

나. 진입도로는 접근 인지도 및 보차도 분리 개념을 감안하여 계획하고, 도서관 내에서도 보차분리 및 보행 전용 동선을 확보한다.

다. 보행에 지장이 없는 곳에 주차장을 배치한다.

라. 건물 내에서의 이동 동선은 간결하게 계획하며, 비상시 신속히 피난할 수 있도록 동선 계획을 구상하고, 장애인 편의와 교재, 교구 등의 반․출입을 위하여 엘리베이터를 계획한다.

4. 디자인 계획

가. 기존 시설물과 자연스러운 조화를 이룰 수 있도록 계획하며 미래형 교육연구시설(도서관)로써 상징성 등을 제시할 수 있도록 계획하여야 한다.

나. 이용자들의 기호와 정서, 지적 창의성 발달 등에 도움이 될 수 있도록 구조물의 매스(Mass), 배치, 입면 형태 및 색상 등을 계획한다.

다. 주변 환경과 조화를 이루며, 독서 분위기를 제고할 수 있도록 녹지, 조경, 담장, 옹벽 및 휀스 등 옥외구조물을 계획한다.

라. 건물 내외, 옥외구조물 등에 사용하는 재료의 색상 및 질감 등은 이용자들의 정서와 교육에 지대한 영향을 미치므로 사용자의 성별 및 연령에 따라 실용도, 내구성 등을 감안하여 계획한다.

5. 구조 계획

가. 모듈, 층고, 기초 및 구조 방식 등은 건축구조에 관한 법률, 기준, 규정에서 제시하는 안전성을 확보하여야 하며 경제적인 설계를 하되 시공성을 고려한다.

나. 층고는 내부 실의 개방감 및 강제 환기 방식, 냉․난방 방식, 천장고 등을 감안하여 계획한다.

다. 천장고는 실당 이용자 수를 고려한 환기, 채광 등을 고려하여 바닥마감재 상단부터 천장 마감재 하부까지 H:2.6m 이상이 되도록 계획한다.

라. 지진에 대비하여 관계 법령에 적합한 내진설계를 적용한다.

1) 지진 발생 시 인명을 지키고 재해 이후의 조기에 사용이 가능하도록 시설이나 설비가 충분한 내진성능을 확보토록 한다.

2) 도서관 시설은 지진 등의 재해 발생 시 지역주민의 응급 피난 장소로써의 역할도 주어지기 때문에 이에 대비한 기능도 계획하는 것이 필요하다.

마. 주요 구조부의 구성 재료는 다음과 같다.

1) 콘크리트, 철근 및 형강의 재질은 KS 규정에 명시된 강도

2) 콘크리트 : Fck = 구조기준에 합당한 강도 이상

3) 철근 : KSD 3504에 규정된 종류(압접 여부에 따라 철근을 지정한다)

4) 형강재 : KSD 3503, KSD 3515에 규정된 종류

바. 건축물의 풍하중 산정 시 주 골조의 풍하중 뿐 만아니라 외장재(외장재와 이를 지지하는 철물, 부 골재)의 설계용 풍하중도 고려하여야 한다.

사. 건물 내 또는 옥상 등 조경 식재에 해당하는 부분의 구조 설계 시에는, 각 실의 기능에 맞는 하중을 검토하여 설계한다.

6. 인테리어 계획

가. 미래지향적이고 특색있는 디자인을 구축하며 건축과 조명, 인테리어(공간, 사인)의유기적 통합설계

나. 전체 및 개별 공간이 통일성을 유지하면서 공간이 하나의 유기적인 스토리텔링이될 수 있게 구성 계획

다. 도서관 동선을 용이하게 식별하기 위해 사용자 중심의 ‘Total Space Branding’을 고려하여 도서관 내·외부그래픽, 심볼사인 시스템을 제시하고 스토리텔링에 부합하는 색채 컨셉 등 통합이미지를 개발 계획

가) 심볼이나 로고타입(한글, 영문, 한자) 디자인 방향 제시

나) 방향, 실명, 층별 디자인 개념 제시

다) 도서관의 기능별 조닝들 간의 자연스럽고 유기적인 흐름을 위한 Signage 디자인

라. 도서관 가구 배치계획에 의한 서가시스템 및 가구·집기디자인계획 개념설정

마. 실별·기능별특성에 맞는 주문형가구와 이동형가구디자인 및 사례분석에 의한 이용자효율 증대를 위한 가구·집기선정의 방향성 제시

1) 열람 공간(자료실)

가) 열람테이블 : 도서열람 및 학습용(전원사용을 위한 멀티포트 적용)

나) 멀티미디어 테이블 : PC, 노트북 등 이용(테이블은 장비와 하부배선 최소화)

다) 서가 : 자료의 특성에 맞는 특징적 디자인 서가를 설치하고, 조명 등을 활용하여 도서전시와 컨텐츠 제공 등 이용목적에 부합하게 제작

라) 벽면서가 : 고정형 제작서가- 도서추천시스템 : 임베디드 되는 가구 형태의 미디어 시스템으로 제작될 경우 전원 및 LAN선 작업과 제품의 특성상 발열이 발생됨으로 송풍시설 고려

2) 문화 및 교육 공간

가) 회의 / 세미나 테이블

나) 스마트 테이블 : 터치가 되는 미디어가 삽입된 형태의 테이블인 경우 이용자의 연령대에 맞춰 설치 위치 고려

3) 로비 및 휴게공간

가) 휴게 쇼파 & 테이블

나) PC 검색대 : 장비와 배선을 고려한 일체형 디자인

다) 안내데스크 : 1층 로비(홀)

4) 필요에 따라 기성품의 리폼

5) 데드 스페이스의 가구 활용 계획

6) 임베디드(Embedded)형태의 ICT 솔루션을 도입할 경우 실내 인테리어와 어울리도록 계획하고 유지보수 및 전원/LAN 설계/발열 처리 방안 계획

바. 냉난방설비, 환기설비, 급수시설, 배수 및 통기관 설비, 소화설비, 전기, 조명, 통신시설 등은 건축공사 계획을 면밀히 검토하여 시설유지의 효율성을 위한 설계를 통한 경제성을 고려하여야 하며 관련법규에 적합하도록 계획에 반영

사. 실내 인테리어시 방염, 방음, 방진설비 계획을 검토하여 이용자의 안전 및 쾌적한 환경조건을 유지토록 계획에 반영

아. 조명은 자연채광과 조화를 이루어 건물의 쾌적성을 위한 최소의 환경을 유지하고,건물의 상징성 향상을 위한 조명을 검토하여 전기설비 설계와 협의

자. 공간별 디자인 개념을 설정하고 실내투시도를 제안(각 실별 제시-발주처와 협의)하여 선정 방향성 제시

차. 공간별 특성을 고려하여 실내재료 마감을 제안하고 관련법규를 준수한다.

Ⅷ		토목공사 설계지침

1. 현황조사

계약상대자는 설계 착수 전 도서관 부지에 대한 현황, 경계, 지적 등을 종합 검토하여야 한다.

2. 부지조성

가. 부지 정지는 홍수 시에도 자연배수가 가능하게 지반 계획고를 결정한다.

나. 토공 계획은 가능한 한 절토, 성토 비율을 1:1로 설계토록 하고 부득이한 경우 토사 유입 및 반출은 합당한 장소를 선정하여 설계한다.

다. 현지 여건에 따라 필요시 축대(옹벽 등) 및 비탈면 보호공을 설치토록 한다.

3. 담장

가. 주위 환경을 고려하여 투시형 울타리 또는 메쉬휀스 등으로 계획하고, 도서관 밖으로 공이 넘어가는 것을 방지할 수 있도록 적정한 높이로 계획한다.

나. 울타리 주변은 수목을 식재할 수 있는 녹지공간을 최대한 고려하여 계획한다.

4. 배수

가. 하수시설 단면은 유량계산에 의거 결정하고, 유량계산 강우강도는 해당지역의 20년의 1회 빈도의 강우강도를 사용한다.

나. 분뇨하수 및 생활하수와 우수처리는 분리 배수를 원칙으로 하여 인근 기반시설 실정에 맞도록 계획한다.

다. 배수시설은 U형측구, 흄관매설, 맨홀, 집수정 BOX암거, 맹암거 등을 복합하여 가장 경제적이고 영구적인 배수 형식을 취하고, 각종 배수시설의 뚜껑은 기성콘크리트 제품 또는 철물제품(주철 또는 스틸그레이팅)을 사용한다.

5. 정문

가. 정문 위치는 인근 부지와 도로 형태에 따른 동선 관계를 고려하고 효율적으로 도서관 부지를 이용할 수 있도록 고려하여 위치를 정한다.

나. 정문 형태를 주위 환경과 도서관으로써의 이미지 등을 고려하여 설계한다.

다. 정문의 폭은 대형차량(버스, 소방 차량 등)이 원활히 진입할 수 있도록 결정한다.

라. 정문 상부에 조형물을 설치할 시 높이는 소방 차량 통행에(소방법) 지장이 없어야 한다.

6. 포장

가. 포장재료는 콘크리트, 칼라콘크리트, 아스콘, 소형고압블럭, 고무블럭, 점토블럭 등 현지 실정의 특성에 부합되도록 충분한 자료를 수집․분석하여 결정토록 한다.

나. 경계석은 시중 기성제품(화강석)을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 포장 재료는 보·차도용으로 구분하여 적절히 적용하여야 한다.

라. 관련 법령에 규정하는 주차장(부설주차장)을 대지 내에 설치토록 한다.

6. 토공 및 흙막이 설계(해당시)

가. 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

나. 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 기본 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

다. 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성(Trafficability)을 확보토록 한다.

라. 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계(해당시)는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을선정하여 설계하여야 한다.

마. 흙막이 설계(해당시)에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지질조사 결과 또는 관련 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용근거를 첨부하여야 한다.

바. 흙막이 시공(해당시)을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

사. 흙막이 설계(해당시)는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주처와 협의하여 결정하여야 한다

Ⅸ		조경공사 설계지침

1. 목적

이용자들에게 휴식·운동 및 놀이를 즐길 수 있는 옥외활동 장소를 마련해 주고 지역적, 문화적 특성 및 주변 환경의 정서 등을 고려하여 도서관의 특성에 맞는 아름다운 녹지 및 시설 경관을 조성하여 건강하고 쾌적하게 이용할 수 있는 도서관 환경을 조성한다.

2. 설계 범위

가. 조경 계획은 관련 법규 및 기준에 적합하고 녹색건축 인증이 가능토록 하여야 하며, 아울러 관목 및 교목의 비율은 적정하게 고려하여야 한다.

나. 건축 및 토목계획에 의거 설계의 합리성, 구조물의 안정성, 설치 시설의 적정성 등에 관한 사항을 분석하여 식재 및 조경시설물을 확정하여야 한다.

다. 공종별 계획을 근거로 실시설계 이전에 공종별 세부 설계기준안을 작성한다.

라. 각 평면계획의 일반적인 현황(위치, 면적, 현 상태 등)이 도입시설의 적정성, 주제의 이미지 형성 정도를 분석하고, 이에 관련된 사항들이 논리적 ․ 기술적으로 타당성이 인정될 수 있어야 한다.

마. 주변 환경 및 입지 여건을 분석하여 주위와 조화되게 배치한다.

바. 각종 자재는 경제적이고 내구성이 있는 재료로 할 것이며, 목적물 외의 이미지 형상에 적합한 것을 채택한다.

3. 특기 사항

가. 부지의 특성과 배경을 기본으로 한 설계 방향을 설정하여 기술적, 경제적 타당성이 검토되어야 하고, 환경 보호와 이용이 합리적으로 계획될 수 있도록 공간개념을 설정하고, 이를 토대로 적정한 기능이 부여되도록 계획되어야 한다.

나. 도서관을 상징하는 수종이나 향토수종, 고장을 상징할 수 있는 수종을 식재하며, 보존가치가 있는 수목이나 식물은 이식 될 수 있도록 설계에 미리 반영한다.

다. 조경대상지는 주변의 생태환경을 고려하고 절․성토 사면은 자연 훼손을 최소화 하며, 환경친화적인 방법으로 복구 ․ 복원 방안을 수립한다.

라. 생태학습의 장(생태 연못 등)으로 활용되는 공간은 친환경 건축물에 적합한 규모로 조성하고 이용자들의 자연학습, 체육, 여가, 휴식 등의 공간으로 활용할 수 있도록 계획한다.

마. 소음이 예상되는 부분에는 밀식 수림대를 조성하고, 조경시설물에는 파고라, 벤치, 앉음벽 등의 휴게시설과 생태연못, 산책로 등을 계획하고 녹화 구역과 조화롭게 계획되어야 한다.

바. 보행로, 광장, 휴게소 등의 포장 구간은 일정한 문양을 넣어 각 공간별 특성을 살리도록 한다. 이때 토목 분야의 포장설계와 상호 연계하여야 한다.

사. 옥상녹화 계획 시는 건물구조에 지장이 없도록 구조보강 또는 경량토를 사용하고, 이용자들의 안전을 고려하여 파라펫 난간 상부에 별도의 난간을 계획한다.

아. 조경시설은 기성품과 현장 제작품에 대해 경제성과 시공 난이도 등을 비교 ․ 검토하여 설계에 반영토록 한다.

Ⅹ		기계설비공사 설계지침

1. 일반 사항

가. 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계하여야 한다.

나. 보수, 유지관리가 용이하여야 하며 장래 증설이나 변경․개보수에 대한 적응성이 있어야한다

다. LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화할 수 있는 설비방식을 고려한다

라. 자동제어, 단순 모듈화 등 다양한 방법을 통하여 업무효율 극대화 및 인력절감을 기대한다

마. 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적 설비방식을 선택한다

바. 냉난방설비, 환기설비, 공기조화설비, 위생설비, 소화설비 및 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주자의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

사. 『친환경상품 구매촉진에 관한 법률』에 의거 친환경 상품을 사용하여야 한다.

2. 일반 지침

가. 냉난방, 환기 및 공기조화설비 설비

1) 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 건물과 조화되고 설비가 차지하는 면적이 최소화되도록 설계하여야 한다.

2) 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 하며, 관리실 등 상시 사용공간이 아닐 경우 별도의 조절 기구를 설계에 반영하여야 한다.

3) 실내의 공조방식은 온․습도 조절이 용이하도록 설계함을 원칙으로 한다.

4) 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

나. 위생 설비

1) 급수방식은 현장상황에 따라 발주자와 협의하여 반영한다.

2) 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

3) 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실에 공급한다.

4) 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

5) 위생기구는 K.S. 제품 또는 동등 이상 제품을 사용한다.

다. 소화설비

소방법규 및 소방시설의 설치규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합하도록 설계하여야 한다.

라. 자동제어설비

자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온․습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태 표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

마. 기타 설비 : 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다

Ⅺ		전기설비공사 설계지침

1. 일반 사항

가. 에너지 절약형 설계를 적극 도입한다.(전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재사용및 고효율 시스템 설계)

나. 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 타 공종과 연관성을 고려한다.

다. 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

라. 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

2. 일반 지침

가. 수변전 설비(해당시)

1) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

2) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

3) 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

4) 한국전력공사와 협의 고품질의 전력을 공급하기 위한 한전인입분담금 및 전기사용전검사 수수료를 산출한다. (순수공사비에서 제외 : 수요기관 부담)

나. 동력공사

1) 전동기의 용량에 알맞는 개폐기 및 전선굵기로 선정하여야 한다.

2) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

3) 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

4) 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

다. 조명설비공사

1) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

2) 용도에 적합한 등기구를 선정하고 필요시 실폭 등을 고려하여야 한다.

3) 등기구의 배치 및 부착방법에 대하여 검토하여야 한다.

4) 건축물의 부분경관조명, 옥외가로조명, 부분연출조명을 고려 계획안을 감독원과 협의 결정한다.

라. 전열공사

1) 콘센트의 설치 높이 및 위치를 적정하게 설계하여야 한다.

2) 용도에 적합한 전압을 선정하고, 콘센트를 설치한다.

마. 소방설비공사

1) 소방 관련 법령에 적합한 설계를 하여야 한다.(수신기, 발신기, 중계기, 감지기, 유도등, 전기화재경보기 등)

2) 각종 소화설비에 따른 감시 및 관리의 편의를 도모하여야 한다.

Ⅻ		정보통신공사 설계지침

1. 일반사항

가. 본 설계는 정보통신설비의 시공 관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 운용 및 확장이 용이하도록 하여야 하며 초고속 정보통신망을 접속할 수 있도록 설계되어야 한다.

나.  시설의 용도변경 또는 미래의 수요를 감안하여 미래지향적으로 충분한 용량을 확보 하여야 한다.

다. 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

라. 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고 주요자재․공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

마. 모든 공사용 자재는 국산자재 사용을 최대한 고려하고 KS표시 중 1, 2급으로 구분된 경우는 1급을 사용한다. 외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 하며, 자재품질은 관련 KS 규격 이상의 제품으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한 것을 사용하여야 한다.

바. 설계 시 방재, 보안에 대한 고려를 해야 한다.

2. 설계범위(공사의 적용범위는 발주처와 협의 후 결정)

가. 구내통신(통합배선)설비

나. 종합유선방송 및 TV공청설비

다. 전관방송설비

라. CCTV설비

3. 설계지침

가. 구내통신 선로설비(전화설비+LAN설비)

1) 미래 수요를 감안한 충분한 회선과 용량을 확보하여야 한다.

2) 기간통신사업자가 제공하는 일반전화 및 IP전화시스템이 수용가능하도록을 통합단자반 설비를 1층의 관리실에 설계하여야 한다.

3) 정보통신시설은 기술기준을 준수하여 첨단시설로 설계에 반영한다.

4) 국선인입관로 매설은 통신 사업자와 협의하고 통신사업자 맨홀에서 통신실까지 인입관로는 지중매설하며 수공맨홀을 시설한다.

5) 장래의 다양한 통신, 정보시스템의 증가를 고려한 예비배관을 계획하여야 한다.

6) 배관은 매입배관을 원칙으로 하며 부득이한 경우 노출 배관한다.

나. 전관방송설비

1) 일반 안내방송, 층별, 단위별 방송이 가능하여야 한다.

2) 소방법규에 의한 자동화재 탐지반 수신기와 연동하여 비상방송이 송출되어야하며 비상방송 시 자동육성 대피 유도방송이 되어야한다.

3) 옥내외 각 공간을 전체 또는 개별로 방송할 수 있도록 구성한다.

4) 스피커 시설은 내/외부 구분 용도에 맞게 선택(천장, 벽부, 칼럼, 혼형)한다.

5) 관리사무실에 방송실을 두고, 시설지 내 주요지점에 옥외 스피커를 설치하여 비상방송을 대비할 것.

다. 감시 및 출입관리 설비(영상감시 장치)

1) 감시 카메라의 설치 위치는 감시대상을 충분히 감시할 수 있는 적당한 위치여야 한다.

2) 카메라는 4.0M 픽셀이상의 카메라로 설계하여야 한다.

3) 모니터는 최소한 42“이상의 LED MONITOR를 사용하여야 한다.

4) 녹화장치는 COMPUTER(NVR) 녹화장치로 하며, 착탈식 기록매체를 사용하여 녹화물 보관이 가능하도록 백업용 하드장치를 공급하여야 한다.

5) 각 CCTV와 NVR은 연계구성은 Ethernet망으로 구성하여야 한다.

6) 옥외 적절한 장소에 카메라를 설치하여야 한다.

라.  ICT 기반의 디지털 정보서비스 계획을 마련한다.

1) 웹 및 앱기반의 이용자 친화적 자료관리시스템 구축

2) 지역문화소통 공간으로 정보광장(Information Commons) 구축

3) 사용자 참여·체험서비스를위한ICT 미디어시스템구축

4) 정부의 4차 산업혁명에 발맞추어 메이크 스페이스와 첨단 ICT장비 및 미디어를 활용한 창의적이고 혁신적인 교육 공간 구축 방안

5) 스마트 큐레이션 미디어와 같은 솔루션을 활용하여 이용자를 위한 학술 동영상지원시스템 자동화 및 예약 등 온라인 정보시스템 구축

6) 문화, 교육 및 도서관 운영관리 스마트 프로그램

ⅩⅢ		소방공사 설계지침

1. 설계지침

가. 화재경보설비

1) 각 층별 발신기 설치는 법적 수용거리 이내에 두고 기계설비의 소화전과도 연동되도록 검토한다.

2) 주 수신반은 중앙공급실과 연동이 되고 부수신반은 상시 근무자가 있는 곳에 설치하며, 비상방송 연동회로 내장할 수 있도록 한다.

3) 감지기 종류 및 수량은 용도와 면적에 맞게 설계하도록 한다.

4) 경계구역 및 구역 일람표를 작성한다.

나. 유도등 설비

1) 용도 및 장소별로 피난구 유도등과 통로 유도등을 설치한다.

2) 기계설비 중 소방시설과 관련한 방재설비를 검토하여 설계한다.

다. 기타 소방관련 법에 정하는 설비(소방 및 소화설비)에 대한 검토 및 설계에 반영한다

ⅩⅣ		설계도서 작성 및 납품

1. 설계도서 작성

가. 설계 설명서

1) 공통분야: 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

2) 건축분야: 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계 내용, 방재계획, 주차계획, 동선계획, 전시 동선계획, 에너지절약 계획, 건축 구조계획, 공정계획 및 세부 공사비 등

3) 토목분야: 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요 재료 선정, 골재원 및 사토장 선정, 배수처리 계획(공사중 계획 포함), 신기술․신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등

4) 조경분야: 토양조사 결과, 배수, 급관수 계획, 식재 및 시설물 계획, 세부공정 계획, 세부 공사비, 유지관리계획, 옥상녹화 계획 등

5) 설계 설명서에 포함될 사항

가) 설계 주안점(테마, 스토리, 지역 및 도서관 특성 등)

나) 설계 진행 과정 일체

다) 조감도, 설계 개요, 대지 현황, 우수시설 사례조사, 법규 검토서

라) 건축 계획, 구조 계획, 토목 계획, 조경 계획

마) 기계설비 계획, 전기·통신, 소방 계획 등

바) 그 외 발주기관에서 요청하는 사항

나. 각종계산서

1) 해당 건축물 내 구조계산서, 에너지 절약계획서 등을 포함한다.

2) 물량산출서

- 수량 산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

- 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출 내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출하여야 한다.

다. 설계도면

1) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정 여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

4) 설계도면에는 주석(Note)난을 만들어 구조물 설계 방법, 사용 재료의 종류 및 강도, 주요 설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

5) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당 도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

6) 설계도면 작성은 AUTO CAD 2010 소프트웨어와 상호 호환되는 제품을 사용하여 발주청 컴퓨터와 완벽하게 상호 호환되도록 조치한다.

7) 설계도면 화일은 출력도면 외에 CD로 제출하여야 하며, 각 화일은 개 별로 바로 열람 및 수정이 가능하도록 조치(파일압축 불가)하고, 도면 Font 및 Plot style 파일을 함께 저장하여 제출한다.(화일색인 목록 CD표지에 부착)

라. 주요자재 선정 검토서 작성

1) 주요자재(시멘트, 철근, 레미콘 등)는 도급자 관급자재를 명기하여야 한다.

2) 주요자재에 대하여 상세히 비교․분석(특성, 정격 사용방법, 제작기준, KS규격품, 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 및 기능성, 안전성, 기밀성, 친환경성 등)한 자료를 서면으로 제출하여야 하며, 자재선정협의회의 협의를 거쳐 적정한 자재을 선정하여 설계에 반영한다.

마. 공사시방서

1) 공사시방서는 국토교통부 건설공사표준시방서를 기준으로 작성하여야 하며, 공사시방서 작성 시 자재․입찰절차․공사비․공사여건 등을 고려하여 당해 공사 조건에 적합하게 시방서 내용을 수정․보완 또는 선택하여 시방서를 작성한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

- 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

- 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

- 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

- 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

- 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등 관한 방법, 시기, 절차 등에 관한 세부사항

- 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

- 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

- 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

- 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 자재, 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

- 공사 전반에 관한 주의 사항 및 절차

- 기타 주요공사 사항

3) 공사시방서 작성 시 유의사항

- 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

- 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

- 표준양식을 사용하도록 하고, 작성 형식의 일관성을 유지하도록 한다.

- 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

- 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

- 사용 자재는 자재선정협의회에서 선정하는 등 특별한 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭 또는 일반적인 용어를 사용하여야 한다.

- 도서관 특성 또는 설계자의 설계의도 상 신기술, 신공법, 특허공법, 특허기술을 채택한 경우는 동 기술이나 공법을 적용해야 하는 타당성을 제시한 후, 발주자, 수요자 등이 참여한 공정성 있는 자재선정협의회를 통하여 결정하여야 한다.

바. 공사내역서

1) 공사내역서 작성은 국토교통부 제정 건설공사표준품셈을 우선 적용하고 “행정안전부 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령 및 건설공사 산업안전보건관리비 계상기준 및 사용기준에 의하여 산출하여야 하며, “건설기술진흥법”품질관리계획 등의 수립 대상 공사를 참고하여 산출한다.

2) 공사내역서는 관련 규정에 의해 산출하되, 아래 기준을 참고하여 산출한다.

가) 재료비

- 조달청장이 조사하여 통보한 가격(시장시공단가)으로 한다.

- 조달청장이 조사한 가격에 없는 자재는 기획재정부에 등록한 전문가격조사기관에서 조사․공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

- 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 최저가격을 적용한다.

나) 직접노무비 : 대한건설협회에서 공표한 시중노임을 적용한다.

다) 일정규모이상 공사의 사용 자재는 발주자가 직접구매(관급)토록 설계자는 관련 사항을 설계도서에 표기하여야 한다.(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조 및 건설산업기본법시행령 별표1)

라) 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우에는 관급자재의 범위 및 품목을 발주청과 미리 협의하여 선정하고, 직접구매(관급)를 할 수 없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하도록 관련 설계도서에 표기한다.(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조)

※ 직접구매 대상 자재는 공개경쟁입찰에 따른 특기시방서 및 물품규격서를 작성․제출하여야 한다.

- 적용 범위: 단일 품목 추정가격이 4천만 원 이상인 자재

- 대상 자재: 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 따라 중소기업자간 경쟁제품』 및 『공사용 자재 직접구매 대상 품목』중 조달청과 단가계약된 물품과 동일한 물품(규격)은 공개경쟁입찰 불가

① 공개경쟁입찰에 의한 방법보다 조달청을 통해 직접 구매해야 할 특수한 사유가 있고, 예산절감 효과가 현저히 크다고 사업부서에서 판        단되는 경우는 공개경쟁입찰 적용 제외

②『자재·공법선정협의회』에서 결정된 자재·공법의 경우 공개경쟁 입찰 적용 제외

2) 필요시 공사비에는 지장물 이설비, 에너지 인입 공사비 및 정밀안전진단비, 시운전비. 실내 공기질 측정비, 기타 시험비, 각종 인증비, 폐기물처리비(100톤 이상 시 별도 작성) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

3) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드 번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출 조서에 그 근거를 기록하여야 한다.

4) 건설공사 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술 수준과 여건이 감안되어야 한다.

5) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

6) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

7) 정부기관 준용품셈 및 적산 참고자료 적용 시에는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

8) 운반비는 목적지, 운반 장비, 운반 거리, 도로 상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

사. 예정공정표 작성

예정공정표는 PERT 또는 CPM 기법으로 설계원도 및 청사진에 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축소하여 제출 한다.

아. 지장물 조서 및 인․허가 도서

1) 지장물 조서 작성

- 지장물은 발주기관과 협의하여 그 범위 등을 결정하여 조사한다.

- 사업 시행으로 인해 훼손되는 지장 수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재한다.

2) 인․허가 도서 작성

- 관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가용 도서를 작성한다.

자) 기타

1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

2) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만 도면 등은 발주청 협의를 거처 A3 등으로 달리할 수 있다.

2. 설계도서 납품

가. 추진 단계별 설계도서의 납품 시기는 다음과 같이 구분한다.

1) 계획설계 : 착수일로부터 30일 이내

2) 중간설계 : 계획설계 납품일로부터 60일 이내

3) 실시설계 최종납품 : 중간설계 납품일로부터 150일 이내

나. 최종성과품 제출은 예비검사 등 모든 검토, 협의, 승인 등이 완료된 후 과업수행 종료일 전에 납품하여야 한다.

다. 최종 성과품의 종류 및 납품수량

구 분	규 격	납품수량	비고
1. 설계도면(공종별 구분)	A1출력, A2책철	3 부	사무실1, 현장1, 감리1
	A1출력, 좌편철	3 부	사무실1, 현장1, 감리1
	A3출력, A4책철	5 부	감독2,도서관1,감리1,현장1
	A4출력, 좌편철	2 부	증빙1, 보관1
2. 설계원도(공종별 구분)	A3출력(트래싱지)	1 부	보관바인더 포함
3. 건축허가서류 (관련 서류 포함)		1 식	세움터 별첨
4. 설계CD 및 USB (내역서, 산출서 포함)	설계도서 일체	2 개	보관1, 조달1
5. 공사시방서	A4	5 부	감독1,감리1,조달1 증빙1,현장1,
6. 설계내역서	A4	5 부	감독1,감리1,조달1, 증빙1,현장1,사무실1
7. 산출기초	A4	3 부	감독1,증빙1,사무실1
8. 일위대가표	A4	3 부	단가적용표 포함
9. 서약서	A4, 참여기술자 전원	2 부	서명날인,
10. 용역 참여기술자 명단	A4, 참여기술자 전원	2 부	서명날인
11. 구조계산서(구조확인서)	A4	5 부	감독1,감리1,조달1 증빙1,보관1,
12. 설계설명서	A4	5 부
13. 조감도1컷, 외부투시도1컷 실내투시도 5컷 이상	60cm × 90cm	1 식	액자포함(가본업무)
	60cm × 90cm	1 식	액자포함(추가업무)
	실내투시도 사진 8'×10'	5 매	액자포함(추가업무)
14. 경관(색채)계획서	A4 책철	5부	도편포함
	A3 좌편철	3부
	A4 색채계획 설명서	5부
	설계CD	2개
15. 신기술적용 검토조서	A4	3 부
16. 공사 예정공정표	네트워크식 (공사기간 산출 포함)	5 부	감독1,감리1,증빙1, 현장1,사무실1
17. 기타 용역수행 관련자료	담당공무원의 요구자료	3 부	해당 시 작성 제출

※ 납품 시 제출도서는 공사의 특성 및 종류에 따라 발주청과 협의하여 조정할 수 있음

【붙임 1】 실별 소요면적 현황(SPACE PROGRAM)

구분	공간			비율(%)	면적(㎡)	좌석(석)	자료(권)
자료 이용 공간 (A)	일반 자료실	서가 영역	종합자료실	17.3	568.4		40,350
			연속간행물
			실버/장애인실
			귀중/향토자료
		멀티미디어(청소년특화)		4.6	149.2	46
		열람 영역	열람영역	9.1	298.4	58
			노트북영역
		소 계		31	1,016	104	40,350
	어린이 자료실	서가 영역	어린이자료실	7.6	248.6		10,442
			유아자료	1.4	46.4		3,248.7
		열람영역		1.6	53	101
		어린이문화교실		1.5	49.7	27
		수유실		1.0	33.2
		소 계		13.1	430.9	128	13,690.7
	계			44.1	1,446.9	232	54,040.7
문화 교육 공간 (B)	문화 교육	강의실		3.0	99.5	53
		동아리실		1.0	33.2
		다목적공간		6.1	198.9	111
		전시공간 또는 영역		2.0	66.3
		개인열람(Carrel Cage)		3.2	102.8	60
		그룹 스터디
		과제수행
		메이커 스페이스
	계			15.3	500.7	224	0
업무 관리 공간 (C)	사무 공간	관장실		0.7	23.2
		사무실		2.7	89.5
		자료보관실		0.5	16.6
		회의실		0.9	29.8
	관리 공간	인포메이션		0.5	16.6
		탕비 및 휴게실		0.6	19.9
		자원봉사자 및 숙직실		0.7	23.2
	보존 서고	자료반입 및 정리		0.9	29.8		2,984
		보존서고		4.4	142.4		39,913
	계			11.9	391.0	0	42,896.1
합 계(A+B+C)				71.3	2,338.6	452	96,937
공용공간(D)	공용공간	홀, ELEV, 계단, 화장실 등		20.4	668.6
	휴게공간	북카페		2.5	82.9
		휴게공간		0.8	26.5
기타	전기, 기계, 창고 등			5.0	162.4
계				28.7	940.4
총 계(A+B+C+D)				100.0	3,279	452	96,937
총 계				100%	3,279

※「2024년도 공공도서관 건립 운영 매뉴얼」유형B, 나-2(도농복합형, 연면적: 2,500㎡~5,500㎡ 미만)

【붙임 2】 신축 예정지 현황

북삼어린이•청소년도서관 위치도(칠곡군 북삼읍 율리 115)

북삼어린이•청소년도서관 대지 현황