사하구 보훈회관, 치매안심센터 등 복합시설 건립

건축설계용역 과업지시서

2024. 06.

부산광역시 사하구

-  목    차  -

Ⅰ. 총칙

1. 과업의 명칭	01

2. 과업의 목적	01

3. 과업의 개요	01

4. 설계 참가자격	02

5. 과업의 범위	03

6. 과업의 기간	09

Ⅱ. 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	10

2. 업무보고 및 회의	14

3. 관급자재의 선정	16

4. 에너지 절약형 건축물 설계	17

5. 보안성 검토	17

6. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	18

7. 별도 추가 업무	18

Ⅲ. 과업수행지침

1. 공통사항	21

2. 설계진행 사항	26

Ⅳ. 설계도서작성 요령

1. 공통사항	33

2. 계획설계	33

3. 중간설계	37

4. 실시설계	44

5 분야별 설계지침	49

Ⅴ. 성과품의 납품목록

1. 일반사항	67

2. 계획설계 납품도서	67

3. 중간설계 납품도서	68

4. 실시설계 납품도서	69

Ⅵ. 붙임자료

I		총칙

과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『사하구 보훈회관, 치매안심센터 등 복합시설 건립 사업 건축설계 용역』이라 한다.

과업의 목적

보훈회관 이전을 통해 국가유공자와 유족의 명예 선양 및 복지 증진에 기여하고, 복지시설 이용자들의 편의 향상 및 효율적 운영을 위해 사하구 보훈회관 및 치매안심센터 등 복합시설을 건립하고자 함

과업의 개요

사업명 : 사하구 보훈회관, 치매안심센터등 복합시설 건립 건축설계 용역

대지위치 : 부산광역시 사하구 신평동 647-1, 647-5

지역·지구 : 준공업지역, 비행안전구역, 역사문화환경보존지역, 일반산업단지

대지면적 : 2,315.10㎡

규모 : 지하1층, 지상5층 내외(관련 법령 범위 내에서 설계의도에 따른 자율)

연면적 5,910㎡ (허용범위 ±2%미만)

시설 용도 : 업무시설, 제1종근린생활시설

총사업비 : 272.42억원 (VAT포함)

예정 공사비 : 226.51억원 (VAT포함)

제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거 및 폐기물 처리 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종 인입에 따른 시설분담금도 공사비에 포함(단, 추후 사하구의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

예정 설계비 : 957,620천원 (손해배상보험, 인증 용역비, VAT포함)

건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리, 기존 건축물 철거 등 제반 분야의 기본 및 실시설계용역 수행 등의 비용을 말한다.

에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경 예비인증, 제로에너지 건축물 인증 등에 소요되는 비용은 용역비에 포함되어 있으며, 인증에 따른 수수료 및 현황·경계복원측량비는 용역비에 포함되지 않음.

과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.

설계도서는 기본 및 실시설계 통합 시행에 따라 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」[별표3]에 근거하여 2종(보통) 중급으로 작성한다.

용역기간 : 착수일로부터 1년간 (공휴일 포함)

설계비의 증ㆍ감 : 계약 후 당초에 설계비를 산출할 때보다 설계비 산출 공사비가 감소 될 경우나 설계비를 산출할 때 하자가 있었음이 발견되었을 때 발주청은 계약된 설계비를 감액 조치할 수 있으며, 발주청의 요청으로 연면적 증가할 경우 설계비 증액은 발주청과 협의 후 승인을 받아야 한다.

설계 참가자격

가. 「건축사법」에 따른 건축사 면허소지자로 같은 법에 따라 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자. 단, 외국의 건축사 면허(자격)를 가진 자는 「건축사법」 제23조에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함

나. 당선자는 계약 시 전기․소방․정보통신 등의 설계에 대한 자격이 없는 경우 다음 전문분야 설계 자격이 있는 자와 공동도급(분담이행)으로 용역을 시행하여야 하며, 기타 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 「엔지니어링산업 진흥법」에 따른 엔지니어링사업자 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

(1) 전기분야 설계용역과업의 자격 :「전력기술관리법」 제14조에 따른 전력시설물의 설계업(종합설계업 또는 전문 설계업 1종 이상) 또는 「기술사법」 제6조에 따른 건설(건축전기설비) 분야의 기술사사무소 등록을 필한 업체

(2) 정보통신분야 설계용역과업의 자격 :「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 엔지니어링사업(정보통신)자로 신고 또는 「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소(정보통신)를 개설한 자 등

(3) 소방분야 설계용역과업의 자격 :「소방시설공사업법」 제4조에 따른 전문 소방시설설계업 또는 일반 소방시설설계업(기계 및 전기) 등록을 필한 업체

(4) 조경분야 설계용역과업의 자격 :「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 따라 엔지니어링사업(조경)자로 신고 또는 「기술사법」 제6조에 의거 기술사사무소(조경)를 개설한 자

(5) 건축구조, 토질 및 기초 설계용역과업의 자격 :「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소 개설등록한 자로 건설(건축구조) 분야, 건설(토질 및 기초) 분야에 등록한 자가 작성해야 한다.

(6) 건축 기계‧설비분야 설계용역과업의 자격 :「기술사법」 제6조에 따른 건설(건축기계설비) 또는 기계(공조냉동기계)의 기술사사무소 등록을 필한 업체

(7) 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 전문분야는 등록된 「국가기술자격법」에 따른 해당 분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

다. 「건축법 시행령」 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따라 관계 법령에서 정하는 관계전문기술자의 협력을 받아야 한다.

과업의 범위

본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계(가설계획 포함)로 구성되며, 관계기관과의 사전협의 및 각종 인·허가(제로에너지 인증, 에너지효율등급, BF인증 등을 포함)에 필요한 서류작성 및 제출, 연면적 변경 시 면적승인 협의에 필요한 모든 업무를 포함한다.

설계용역 성과물은 제반 인허가・협의 및 심의, 각종 인증을 득한 성과물이어야 한다.

필요시 공사비 내역서는 사하구의 연차별 예산 현황에 맞춰 차수 분리하여 공사계약이 가능하도록 사하구와 협의하여 분리 작성하여야 하며, 발주처는 조달청 계약의뢰 시 필요한 설계자료(내역서 등)을 요구할 수 있다,

건축(기존 건축물 해체 포함), 기계, 전기, 소방, 조경, 토목, 내부 마감, 내부 수선, 폐기물 처리 등 제반 분야 일체의 내용을 포함한다.

사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원

각종 인증 및 적용사항은 기준시점 관계 법령에 따라 설계에 반영하고 (예비)인증을 취득하여야 한다.

녹색건축물 조성 지원법에 따른 에너지 절약계획서 검토 실시

에너지효율등급 인증, 제로에너지 건축물 인증, 장애물 없는 생활환경 예비인증 등에 소요되는 비용은 용역비에 포함되어 있으며, 인증에 따른 수수료는 용역비에 포함되지 않음. (기준시점 관계법령에 따라 인증 불필요시는 기반영된 대가를 감하여 변경계약 한다.)

국토교통부 고시 ‘범죄예방 건축기준고시’를 준용하여 적용한다.

기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 사하구가 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성, 합동토론회 발표자료 작성 및 조치사항 설계도서 반영

본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 사하구와 설계자의 협의 하에 수행한다.

인․허가 업무

본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 설계자가 대행하여야 한다.(건축협의 등 각종 인허가 접수 및 처리에 소요되는 수수료 포함)

설계자는 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련 법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

설계자는 향후 사용승인 신청시 준공도서 작성, 인장날인 등 해당 사하구의 업무에 적극 협조하여야 한다.

과업 완료 후 건축서비스산업 진흥법 제22조 및 같은 법 시행령 제19조에 따라 설계자는 건축과정에 참여하여 설계의도가 구현될 수 있도록 설계취지 및 건축물의 유지관리에 필요한 사항을 제안하여야 하며, 참여 내용 및 책임범위는 해당 법령에 따른다. 또한 건축 과정에 참여함에 따라 건축물 사용승인 신청(또는 건축물대장생성신청 등) 시 같은법 시행규칙 별지 서식의 참여설계자 확인서를 제출하여야 한다.

설계자는 본 용역이 완료된 후라도 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 사하구의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

본 과업지시서는 『사하구 보훈회관, 치매안심센터등 복합시설 건립 사업 건축설계 용역』에 적용한다.

예정공사비 허용 범위 내에서 설계함을 원칙으로 한다.

계약심사 업무지원 내용을 포함한다.

1) 실시설계 완료 후 「부산광역시 계약심사업무 처리 규칙」에 따라 공사 계약심사에 필요한 모든 자료를 제출하여야 하며 계약심사 후 지적사항에 대하여 수정된 설계도서(내역서 등)를 제출하여야 한다.

2) 분야별 공사 계약심사 수감 및 지적사항은 건축분야 설계자가 총괄하여 市와 협의해야 할 의무가 있고, 분야별 설계자는 지적사항을 반영해야 할 의무가 있다.

설계변경 및 정산

1) 발주청은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 설계용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 용역자는 발주청의 방침에 따라야 한다.

2) 설계 또는 공사 진행 중에 발주청에서 필요하다고 인정되어 설계변경 사항이 발생 할 경우에는 즉시 응하여야 하며, 이때 발생되는 설계변경 용역비는 무상으로 한다.

3) 공사 중 설계변경사항이 발생하였을 경우에는 시공자 및 감리자로부터 설계변경도서 일체(설계도면, 설계변경내역서, 설계변경내역서 산출 근거 등)를 제출받아 설계변경사항 및 설계변경도면 등 설계변경도서 일체가 건축법령 등 관계법령에 적합한지 여부를 검토 후 「건축법」제23조에 따라 건축법령 등 관계법령에 적합하도록 “설계변경 후 도면”을 보완 수정하여 대표 건축사의 직인을 날인 후 발주기관(감독부서 등)에 최종 제출하여야 한다. 설계변경 사항이 「건축법」제16조 허가와 신고사항의 변경에 해당될 경우에는 그 절차를 이행하여야 한다.

※ 설계변경내역서 산출근거

- 설계변경개요서

- 설계변경 전･후 설계도면, 설계변경내역서, 일위대가목록, 일위대가표, 중기산출서, 단가대비표, 수량산출서, 수정 상세도면, 표준품셈사본, 물가정보지 사본(신규품목일 경우 품목당 2부 이상), 견적서(신규품목일 경우 품목당 2부 이상), 현장 사진대장 등

납품 및 검수

1) 최종 설계도서는 계약 납품일 5일 전에 납품명세서에 의한 설계도서를 미리 제출하여 발주청의 예비 검토를 받은 다음 수정이 있을 경우 수정 완료하여 납품하고, 보완 지시가 있을 때는 지체 없이 응하여야 하며 최종 설계성과품 납품과 동시에 설계의 경제성 등 검토제안 내용에 대한 설계반영 결과를 작성하여 설계보고서에 포함시키고 이를 발주청에 제출하여야 한다.

2) 최종 납품된 설계도서 등 모든 용역 성과품에 대하여서는 납품과 동시에 발주청에 귀속된다.

설계의 하자책임

1) 설계용역자는 설계상의 하자로 인하여 설계 및 시공 시 공사비 손실, 인명의 피해, 기타 공사 진행상 상당한 지장을 초래하였을 때는 계약기간 만료 이후에도 이에 대한 모든 책임을 진다.

2) 설계용역자는 착공 후 설계상의 하자로 인해 설계변경이 필요할 경우 각종 회의에 참석해야 할 의무가 있고, 새로운 설계안 제시 및 검토 등의 요구에 따라야 한다.

3) 추가 검토 및 설계안 작성에 따른 비용은 설계용역자가 부담하여야 한다.

계속자문

1) 설계용역자는 과업완료 후에도 본 과업과 관련하여 필요시 관련서류 작성 및 자문에 응하여야 한다.

2) 설계용역자(내진설계 Check List 책임기술자 포함)는 공사 착공 전에 시공자, 감리자 합동으로 개최하는 사전 검토 회의에 참석하여 설계의 적정성 검토를 충실히 하여야 한다.

설계자의 날인 : 설계자는 다음 각 호의 수속절차를 하는데 필요한 신고 및 신청에 날인하여야 한다.

1) 「건축법」제29조(공용건축물에 대한 특례)에 따른  [별지 제1호의4 서식] 건축ㆍ대수선ㆍ용도변경 (변경)허가 신청서(설계자)

2) 「건축법」제21조에 따른  [별지 제13호 서식] 착공신고서(설계자)

3) 「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」제12조제1항제2호에 따른 [별지 제10호 서식] 건축물대장 생성 신청서 (설계자)

4)  1), 2), 3)항의 업무를 수행하기 위한 서류 및 도면작성도 설계자 부담으로 수행한다.

5) 위 사항에 대하여서는 민ㆍ형사상의 이의를 제기할 수 없다.

6) 기존 건축물 철거에 따른 대장 말소 업무를 이행하여야 한다.

7) 설계용역자(책임기술자, 대표 건축사를 말함)는 세움터 상에 사용승인신청(또는 건축물대장생성신청 등)을 한 경우에는 건축, 기계, 토목, 조경 분야 등 모든 공사 준공도면에 대하여 세움터 상에서 본인(책임건축사)의 전자 인증을 반드시 이행하여야 한다.

기타 사항

1) 지진 및 태풍, 홍수 등 자연재난을 대비한 계획을 건축설계에 반영하고 재해 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처할 수 있도록 계획한다. 급격한 기후변화로 인한 폭우, 장마 등으로 누수, 침수 등의 문제가 발생하는 것에 대비 가능하도록 하며, 내풍압에 대하여 기존의 데이터 기준보다 강화하여 설계하도록 한다.

2) 공공건물의 하자 발생(누수 등)으로 건물의 내구성이 떨어지는 경우가 많으므로, 외장재, 시공방법 등의 선택에 있어 하자 발생 최소화를 최우선 과제로 한다.

3) 공사비를 산정할 때 기존 건축물 철거비용 및 토목공사 비용 등을 고려하지 않은 설계안이 당선될 경우 발주청에 공사비 추가 확보를 요구할 수 없다.

4) 총 공사비는 부가가치세를 포함하여 예정공사비 이내로 계획하여야 하며, 반드시 개략공사비 등을 구체적으로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 계획하여 한다. 설계 내역 작업 시 공사비가 초과될 경우 설계안을 수정하여 공사비 내에 맞추어야 하며, 이에 따른 제반비용은 설계자가 부담하여야 한다.

5) 대지 현황 및 시공성, 경제성 등을 고려하여 층수를 계획하고 대지현황과 지반조사 결과 등을 참고하여 설계한다.

6) 지하층 공사에 따른 민원이 우려되는 현장이므로 설계단계에서부터 이를 고려하여 소음과 진동을 최소화 하는 방향으로 설계하도록 한다.

7) 본 과업에 투입된 기술자는 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가한 경우 발주청의 승인을 바아 교체하고 발주청에 의해 과업수행이 부적합하다고 판단된 경우 기술자에 대해 발주자가 즉시 교체를 명할 수 있으며, 설계용역자는 이에 따라야 한다.

8) 설계용역 착수 및 완료 전 반드시 현장을 방문하여 설계도서와의 상이점 발생여부를 확인하여야 한다.

9) 과업지시서 내 정하지 않은 사항이나 상충되는 내용이 있는 경우 반드시 각 감독관에게 협의 후 결정하고 사전 협의 없이 설계자 임의로 결정한 사항 및 과업지시서 미숙지에 따른 책임은 계약자가 부담한다.

과업기간

본 과업의 기간은 착수일로부터 1년간 (공휴일 포함)으로 한다.

실시설계 심의에 따른 수정․보완기간 제외하며 건축협의 등 각종 인·허가 과정에서 발생되는 보완기간은 제외한다.

단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 인․허가업무(기존 건축물대장 말소, 건축허가, 허가사항 변경, 착공 및 건축물대장 생성 신청 등 각종 세움터 접수 및 처리 업무 포함) 관련 자료의 제출(공사 중 발생된 공법 등 기술적인 검토 사항 포함)과 설계 미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 수행한다.

다음의 경우에는 사하구가 별도로 정하는 감독관의 승인을 득하여 과업수행 기간을 연장할 수 있다.

사하구의 방침에 의하여 과업 시행이 중단될 경우

사하구의 사업계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

천재지변으로 인하여 용역 수행이 불가능한 경우

각종 협의 및 관련 절차이행 (기술자문위원회, 도시계획위원회, 건축협의, 예비인증 관련 등)으로 과업이 지연되었을 경우

민원 발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능한 경우

안전을 위해 용역의 전부 또는 일부의 정지가 필요한 경우

대지 등의 현장상황을 검토하기 위한 추가 검토기간이 필요한 경우

기타 발주기관이 정당하다고 인정할 수 있는 사유가 발생한 경우

공사규모를 변경할 수 있는 경우는 다음과 같다.

법령 등 행정관청의 조례, 규칙, 기준 등에 의한 각종 심의결과에 대한 수정ㆍ보완을 위하여 불가피한 때

사하구의 설계도서 검토결과 관계법령 등의 위반, 모순 등에 대해 건물성능 확보를 위해 불가피한 때

기타 사하구의 사정으로 인하여 공사규모의 조정이 불가피한 때

II		과업의 내용

과업수행 중 단계별 제출서류

설계자는 용역착수 시에 다음 서류 2SET를 제출한다.

착수계 1부 (공문포함)

책임기술자 선임계 [붙임2] 1부

과업수행계획서 1부

설계용역수행 조직표 1부 (연락처 기재)

용역수행계획서 참여기술자 명단 [붙임3] (업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 이력서 등) 각 1부

※ 참여기술자는 관련법 규정에 적합한 자격요건 이상을 갖춘자여야 함.

설계용역 예정공정표 1부

인력, 장비투입 예정현황 1부

설계참여자 보안각서 [붙임1] 각 1부 (보안계획서 작성 포함)

기타 관련서류 (설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항 등)

기타 사하구가 필요하다고 인정하는 사항

설계자는 착수계 제출 후 10일 이내에 발주처와 협의하여 착수회의를 개최하여야 하며, 위 ‘가’호로 승인된 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

설계자는 1단계 심사일(승인된 예정공정표 1단계 심사일)까지 다음 서류를 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 2부를 제출하여야 한다.

지급된 1단계 심사(계획대안검토) 체크리스트 작성제출

1단계 심사 체크리스트 주요내용 안내

관련법규검토

배치, 평면안 검토

구조공법 검토

설비공법 검토

현장조사의 적정성 검토

사하구 요구 적용 여부

관련법규 검토서

배치, 평면, 입면안을 포함한 설계도면

사하구 요구사항 반영 도면

관련서류를 포함한 USB저장장치

계획설계도서 납품 (1단계 체크리스트 검토결과 반영)

세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

관련법규 검토서

현장조사 결과보고서

현황측량 성과도

유사시설 견학보고서

기타 사하구의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

설계자는 2단계 심사일 (승인된 예정공정표 2단계 심사일)까지 다음 서류를 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 2부를 제출하여야 한다.

지급된 2단계 심사 (도면,내역,설비검토) 체크리스트 작성제출 및 승인

2단계 심사 체크리스트 주요내용

공사비 검토(총괄, 분야별)

설계도면검토(분야별)

공사시방서 검토

구조계산서 검토

예산초과시절감방안 검토

부하계산서 검토

관급자재선정 반영검토

개략공사비 내역서

공종별 설계도면

공사시방서 (초안)

구조계산서 등 계산서, 물량산출서

예산초과 시 예산절감방안 검토서

관련서류를 포함한 USB저장장치

중간설계도서 납품 (2단계 체크리스트 검토결과 반영)

세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

중간설계도서

지질조사보고서 (필요시)

주요공법, 장비, 자재 선정 보고서 (대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

건축물 에너지효율등급, 제로에너지, 장애물없는 생활환경 인증 취득 관련 검토서 및 자료

기타 사하구의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

설계자는 3단계 심사일(승인된 예정공정표 3단계 심사일)까지 다음 서류를 감독관과 사전 협의/승인을 받아 각 2부를 제출하여야 한다.

지급된 3단계 심사(실시설계 중간점검) 체크리스트 작성제출

3단계 심사 체크리스트 주요내용

설계설명서 검토 (분야별)

실시설계납품도서

실시설계도면 검토

발주용 내역서 검토

공사시방서 검토

구조계산서 검토

물량산출서 검토

단가산출,견적서 검토

분야별 크로스 체크

내역서 (원가 제비율)

인허가용 설계도면

계산서 및 물량산출서

단가산출서, 견적서

관련서류를 포함한 USB저장장치

실시설계도서 납품 (3단계 체크리스트 검토결과 반영)

세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

실시설계도서 일체

공사예정공정표 (국토교통부 훈령 제1140호 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 공사기간을 산정하고 그 산출근거를 명시하여야 한다.)

※공사기간 산출 시 기존건축물 철거에 따른 행정절차(건축물 해체 심의 등)에 따른 기간을 고려하여 산정한다.

종결보고서

건축협의서 (제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

장애물 없는 생활환경 예비인증서

제로에너지 건축물 예비인증서

녹색건축 예비인증서 (해당 시)

손해배상보험증권 (보증기간은 공사준공일까지 산정)

기타 사하구의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

기타 서류

용역의 진도보고

주간공정보고 [붙임 5]

월간공정보고 [붙임 6]

업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

업무보고 및 회의

설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

업무보고

주간공정보고[붙임 5]

주 1회 작성. 매주 금요일 오전 10시까지 업무 수행사항 및 예정사항을 작성해서 메일로 제출

월간공정보고[붙임 6]

감독관과 협의하여 매월 협의일자를 기준으로 업무수행 사항 및 예정사항을 작성하여 붙임의 양식에 의거 제출하여야 한다.

수시보고

설계용역 진행 중 문제점 발생시에는 문제점을 분석하여 발생시마다 제출하고, 사하구 요청시 수급인은 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

업무회의

일반사항

설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 사하구와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 하거나 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 사하구와 협의하여 결정하여야 한다.

본 과업지시서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 사하구의 승인을 받아 채택할 수 있다.

설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료를 작성하고 회의에 참석하게 하여야 한다.

설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 사하구의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 반영하여야 한다.

설계자는 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 10일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 사하구에서 개최하고 관련내용을 협의하여야 한다.

업무 착수회의

업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일로부터 10일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

착수 보고회

① 발주청의 요구가 있을 때 착수일로부터 30일 이내에 개최하여야 한다.

② 착수보고 전 사례조사가 완료되면 그 결과 내용을 포함한 보고가 되도록 한다.

중간 보고회

① 기본설계 완료 후 7일 이내 개최하며, 사업 책임 기술자가 계획설계 및 중간설계 내용을 토대로 설계 진행계획을 PPT 등을 활용하여 설명하여야 한다.

② 보고회 자료의 서식은 발주기관이 지시 또는 발주기관이 제시한 서식에 따른다.

※ 설계용역자는 발주청의 요구가 있거나, 필요할 경우 중간보고회를 추가 개최할 수 있다.

최종 보고회

① 최종보고회는 용역 완료 15일 전에 하여야 한다.

② 최종보고회는 사업책임기술자가 실시설계를 토대로 설계의 전반적인 내용을 PPT 등을 활용하여 설명하여야 한다.

수시회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

기타 회의

사하구의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 설계자는 사하구의 요청에 따른 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 사하구에서 별도 통보할 수 있다.

업무보고 및 회의내용의 기록

각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 사하구에 제출하여야 한다.

관급자재의 선정

근거 규정

‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙’제86조

‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령’제11조

설계자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성, 제출하여야 한다.

설계자는 관급자재 선정심의에 필요한 자료 작성시 사하구 담당자와 긴밀히 협조하여 관급자재 선정 심의 운영에 적극 협조하여야 한다.

주요공정별 1개 품목 구매금액이 1천만원 이상인 자재는 경제성, 성능 및 품질 등을 검토하여 부산지역 생산자재를 우선 반영하고, 미반영 시 사유를 제출하도록 한다.

공사비 절감을 위하여 조달청에 등재되어 있는 품목의 경우 최대한 반영하고 미반영 시 사유를 제출하도록 한다. 추후 설계내역 작업 시 감독관은 관급자재 반영을 지시할 수 있으며, 설계자는 별도의 사유가 없을 경우 내역에 반영하여야 한다.

특허 관련 자재, 시공법 등을 사용할 때에는 반드시 감독자에게 구두로 알려야 하며, 알리지 않고 설계를 진행할 경우 감독관은 이를 변경할 수 있다.

에너지절약형 건축물 설계

관련 규정

공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정

건축물의 에너지절약설계기준

건축물 에너지효율등급 인증 기준 및 제로에너지 건축물 인증 기준

기타 에너지 관련 제반 규정

‘건축물의 에너지절약 설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 인증기관과 에너지절약 사전협의 실시

보안성 검토

설계자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

설계자는 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

착수 시 보안대책을 수립 (착수계 제출시 설계참여자 전원 보안각서 첨부)

모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

설계자는 보안상 결함이 없도록 하고 보안 사항의 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계자에게 있다.

설계공모 심사위원 지적사항 반영

설계자는 설계공모 심사시 심사위원의 지적사항이 설계에 반영 될 수 있도록 한다.

설계공모 심사위원 지적사항에 대해 설계단계별(계획, 중간, 실시)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수시에 보고한다.

계획, 중간, 실시설계단계에 설계도서 납품 시에 조치 결과보고서를 필히 첨부한다.

별도 추가 업무

건축사법에 의한 기본업무와 아래와 같은 업무도 용역에 포함한다.

설계관련 부가업무

건축허가신청서 작성, 관련기관 업무 협의, 협의 결과 이행하여야 할 절차 이행 및 관련 대리 업무

조감도 또는 투시도

계약심사 담당부서에 공사발주를 위한 계약심사업무 협의서류 작성 업무

담당부서에 설계의 경제성검토를 위한 협의서류 작성업무 및 검토결과 반영업무

「건설기술 진흥법」에 의한 설계의 안전성 검토 대상사업으로 계획시, 이에 따른 업무

「지하안전관리에 관한 특별법」에 의한 소규모 지하안전영향평가 대상사업으로 계획 시, 이에 따른 업무

색채디자인 기본계획 (내외장재 색채의 기본계획을 설계도면에 표기)

안전관리계획 수립 및 설계의 안전성 검토보고서 작성

① 「건설기술진흥법」제62조 제1항에 따라 안전관리계획 수립

② 「건설기술진흥법 시행령」제75조의2에 의거하여 설계 시행 단계에 한국시설안전공단에 설계의 안전성 검토를 의뢰하여 안전성 검토보고서를 작성하여 아래 성과품을 제출하도록 한다.

가) 설계안전검토보고서 [지침 별지 제1호 서식]

나) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항 ※ 건설공사 안전관리 업무수행 지침

③ 「산업안전보건법」제67조에 의거하여 유해·위험요인의 감소방안을 포함한 안전보건대장을 작성하여 제출하도록 한다.

④ 기타 과업지시서에서 정한 사항 등

가) 측량, 지반조사, 지하매설물, 인근 지장물 조사 등을 실시하여 설계에 반영

나) 기타 각종 자료의 작성 및 기술제공 등 과업수행에 필요한 사항

다) 필요시 공청회 또는 설명회 개최에 따른 업무

라) 용역 완료 전까지 관련법에서 정한 보험 또는 공제증서의 제출

마) 필요시 사례 비교조사 제출 및 본 사업 적용․반영 사항 등

바) 설계자는 사업부지 특성에 따른 행정절차를 설계용역 완료 전까지 필히 득해야 한다.

기술자문 및 의견수렴

① 본 과업수행 기간 중 설계용역자는 필요시 관련전문가의 기술 자문 및 의견을 받도록 한다.

② 본 과업수행 중 사하구 공공건축단을 활용한 자문회의를 3회 이상 참여해야 하며, 용역자는 자문회의 의견을 반영하여 설계안을 수정하여야 할 의무가 있다.

③ 발주청은 자문회의 전 자문단에게 설계안 설명을 요구할 수 있으며, 용역자는 이에 응해야 한다.

그 외 발주청에서 요구하는 사항

조사·기획업무

기획 및 경제성 검토, 일정의 검토

부지측량도 검토 , 지반조사의 협력

조사·검토에 바탕을 둔 조사보고서, 기획설명서 등의 작성

발주청에서 제공하는 기초자료를 참고하고, 필요 시 발주청과 협의 후 추가 조사를 실시하여 현황측량, 지반조사, 폐기물 처리, 지하수위조사, 민원사항 등 설계에 필요한 일체의 조사 및 성과물 제출

※ 발주청에서 제공하는 지반조사보고서를 참고하여 공사비 및 도면을 작성하고, 예정공사비 범위 내에서 설계한다(기존 건축물 철거 및 토목공사비 포함). 또한 설계용역 중 또는 착공 이후 추가 지반조사결과에 따라 설계변경이 필요할 경우 용역 완료 이후라도 설계변경도서는 추가 작성해야 한다.

※ 설계하중이 미달될 경우 기초보강방법을 제시하여야 하며, 지반여건 상 변경되는 설계도서는 용역완료 후라도 추가 작성하여야 한다.

※ 「신에너지 및 재생에너지 개발･이용･보급촉진법」제12조의 5에 따른 신재생에너지 공급의무화를 위해 지붕 상부에 태양광 패널을 설계할 시에는 빛반사에 대해 검토하여 민원발생 우려 등 장애요소가 없는지 충분히 검토하여 설계에 반영한다.

Ⅲ		과업수행 지침

공통사항

적용 요령

용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 설계자가 보다 합리적인 방안으로 연구·발전시킨다.

본 과업내용서 외에 관계 규정 및 각종 시행 기준을 준수하여야 하며, 본 과업 내용서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 과업내용서를 우선 적용하도록 한다.

본 과업내용서에서 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 사하구와 협의하여 정한다.

설계자는 본 과업내용서에 대한 대안을 제시할 수 있으며 그에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여야 하고, 사하구의 승인 후 대안이 채택될 수 있다.

설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 사하구에서 운영하는 기술자문회의 또는 기술심의를 거쳐 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

이 기준에서 규정한 사항 이외에 설계도서의 작성에 필요한 사항은 한국산업규격 KSF1501건축제도 통칙이 정하는 바에 의한다.

“건축물의 설계도서 작성기준”(국토교통부고시 제2016-1025, 2016.12.30.) [별표]설계도서 작성방법에 의거 계획설계, 중간설계, 실시설계 도서를 작성한다.

안전사고 예방사례를 분석하여 위험 공종을 목록화하고 안전사고 예방을 위한 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

지하굴착 시 안전대책

구조물 변경 공사 시 안전대책

우기시 및 동절기 안전대책

유지관리 종합안전 대책 등

사하구, 설계자의 책임 및 업무

설계의 목표와 추진 절차

설계자는 건설공사의 시행 과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

설계자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역 착수 시 계약에 의거 사하구가 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 한다.

설계자는 사하구의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

설계자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계 용역의 각 단계별 성과품을 작성하며 그에 대해 총체적 책임을 진다.

설계는 관련 법규와 계약 조건, 사하구와 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 설계자는 사하구에게 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, 사하구 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색해야 한다.

사하구는 설계자가 언제든지 설계 용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있도록 적극 협조하여야 하며, 설계자는 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 사하구에 알려야 한다.

설계자는 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상황을 준수하여야 하며, 모든 설계도서에서 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

설계자는 계약을 체결할 때와 설계용역을 착수할 때, 설계도서를 완성하여 제출할 때 반드시 대상지를 방문하여 대상지의 실제 조건과 계약 및 설계도서와의 상이점이 발생되지 않도록 하여야 한다.

설계자는 용역 종료 후 공사 진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 사하구가 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 자신의 비용으로 지체 없이 이를 이행하여야 한다.

계약의 수행 중 설계자간에 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의불가 시에는『지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준』제14장 용역계약 일반조건, 제12절 부정당업자의 제재와 당사자의 의무, 3. 분쟁의 해결기준에 따르되 분쟁 기간 중이라 할지라도 설계자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 안 된다.

공정 계획

설계자는 설계 용역의 공정에 대하여 네트워크(Net Work)공정표를 작성하여 사하구에 제출하여 승인을 받거나 사하구가 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안한다.

공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 사하구가 동의한 공정 계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

최초의 공정 계획이 계약 조건에 포함되지 않았다면 사하구와 설계자의 용역 착수 회의에서 제안되고 검토되어야 한다.

공정 계획은 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역 수행 과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

업무점검표(Check List)

설계자는 계약의 성공적인 완성을 위해 모든 업무에 대하여 검토 가능한 목록을 작성하여야 한다. 이러한 업무점검표는 업무 진행에 따라 관리되고 필요시 수정, 보완되어야 한다.

업무점검표 각 항목은 업무의 시작과 완성 날짜는 정확하여야 하고 전체 공정계획과 일치하여야 한다.

업무점검표는 각 공정에 맞추어 공정보고 시 사하구에 제출되고 검토․보완되어야 한다.

공정보고

용역의 진도를 보여주는 공정보고는 매주 정해진(매주 금요일 10시까지) 날짜에 감독관에게 제출되어야 하고, 만약 공정이 지연되면 그 사유를 명시하고 적절한 대책을 수립하여야 한다.

주간공정보고 누락시 책임을 물을 수 있으며, 설계용역 진행 중 문제점이 발생할 경우 문제점을 분석하여 발생 시마다 제출하고 발주청 요청 시 수급인은 설계진행사항을 보고하여야 한다.

인․허가 및 승인

용역 착수 시 인․허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성하여 감독관에게 제출함으로써 업무 범위를 명확히 하고, 필요한 경우 사하구의 협조를 받아 필요한 도서를 작성함과 동시에 인․허가 취득에 성실히 노력하여야 한다.

하도급 사항

설계자는 본 용역과업의 모든 사항에 대하여 사하구의 사전승인 없이 일부분이라도 타 업체에 하도급을 할 수 없다.

설계자는 하도급에 대하여 사하구의 사전 승인을 받은 후 하도급 계약을 체결하고 계약 체결일로부터 10일 이내에 다음 각 호의 사항을 사하구에 통지하고 관리를 받아야 한다.

용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 사하구의 장에게 보고하여야 한다.

설계자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

설계자는 하도급 부분에 대하여 사하구로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.(하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조 제3항) 이를 어기거나 대금을 어음으로 지급하는 등 태만할 경우에는 발주자가 직불할 수 있으며 이때 계약상대자는 동의하여야 한다.

책임한계 (하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 설계자의 책임으로 한다.)

업무 연락

업무 연락은 설계자와 사하구가 상호 근거를 남길 수 있는 방법으로 수행되어야 하며, 용역 착수 시 설계자가 과업수행계획서에서 업무 연락의 절차, 조직, 방법 등을 체계적으로 제안하여 사하구의 승인을 받아 시행하여야 한다.

사하구 승인

설계자는 용역 착수 시 작성하는 과업수행계획서에서 성과품 및 자료에 대한 사하구의 승인, 검토, 자문, 자료 제출의 범위와 절차 및 기간을 제안하여 승인을 받아야 한다. 이때 사하구의 적절한 검토 소요 기간은 설계자의 용역 수행 기간에 별도로 반영한다.

설계자는 사하구에 의해 소집되는 업무 회의에 참석하고 성과품을 승인요청서와 함께 제출한다.

대지 현황 자료

설계자의 분석 및 검토

설계자는 성실하게 전문지식을 이용하여 제공된 자료 및 서류에 대해 조사․연구를 해야 한다. 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 서면으로 사하구에 제출하여 필요한 조치를 취해야 한다.

설계자는 대지의 현황에 대한 실사를 실시하여 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(인접 대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애요인 등)을 조사하여 사하구와 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

설계자는 대지 경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하 매설물, 이용 가능한 시설이나 상태, 조사 자료, 일반적 기록, 추가 정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

공사비와 예산

설계자는 용역 수행 시 추정 공사비를 지속적으로 검토하고 사하구와 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력해야 한다.

개산 견적과 별도로, 상세 견적은 계약서에 의하고, 이때 설계자는 설계 용역이 진행되는 동안 견적을 위하여 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동 비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

설계 진행사항

착수신고서 및 기타 제출서류

설계자는 계약일로부터 10일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

착수계

착수보고서

사업 책임기술자 선임계 [붙임2] (이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

설계용역 예정공정표

용역비 내역서

설계용역수행 조직표

분야별 설계용역참여기술자 현황 및 관련 서류

기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

보안각서 [붙임1]

기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

설계자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

용역 기성부분 검사원

용역 준공 기한 연기원

용역 준공 검사원

하도급 통지 또는 하도급 승인요청 [붙임4]

기타 용역 수행에 필요한 사항

과업수행계획서

계약상대자는 착수일로부터 15일 이내에 아래내용이 포함된 과업수행계획서를 작성·제출하여야 하며, 사하구는 제출된 내용이 미흡하거나 변경요인이 있을 시 계약상대자에게 수정을 요구할 수 있다.(과업수행계획서는 본 용역 계약 서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

각 관련주체(건축, 기계, 전기, 통신, 조경, 토목 등)간의 업무범위와 책임한계

과업수행계획서 참여기술자명단 및 참여기술자 조직표, 전문분야별 기술자 중 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련 주체의 작업반 구성이 되도록 작성한다.

전기분야설계는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 제1종 이상 등록자가 책임 설계하여야 한다.

정보, 통신분야설계는 정보통신공사업법에 의한 설계 유자격자가 설계하여야 한다.

소방분야는 소방시설공사업법령에 의한 일반(기계 및 전기) 또는 전문소방시설 설계업 등록자가 설계하여야 한다. 단, 제연설비는 전문소방시설 설계업 등록자(기계)가 설계하여야 한다.

목표예산을 고려한 설계운용계획(Design to Cost)

사하구가 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공으로 인한 설계변경 및 과다한 공사비 증액이 발생하지 않도록 계약상대자는 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

본 과업내용 중 설계 지침상 친환경적 계획요소로서 자원의 효율적 활용 등 설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 소요 공사비용을 면밀하게 검토, 제출한다.

상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 다음 항에서 규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여 사하구의 승인을 득한다.

부실설계 및 향후 공사비의 과도한 증액이 발생할 경우에는 관련법령에 따라 용역업자 및 용역참여기술자에 대하여 불이익을 줄 수 있다.

업무협의 및 공정보고

설계자는 계약 후 10일 이내 착수신고서 제출 시 사하구와 1차 업무협의를 한다.

2차 업무협의는 과업수행계획서 제출시 하고, 이후 계획설계, 중간설계, 실시설계 단계에 따른 절차 등 업무협의를 하여야 한다. 또한 다음과 같은 경우에도 반드시 업무협의를 한다.

조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정시

기본계획 완료시

실시설계 완료시(유지관리 계획 포함)

성과품 작성 시

건설기술심의 등의 관련 심의 시

계약심사 시

공정보고시(주간/월간)

준공시

상기 협의를 포함하여 과업수행기간 동안 사하구와 설계자는 월 1회 이상의 업무협의를 갖는다.

중간 검토

설계자는 다음과 같은 사하구의 중간 검토에 필요한 사항을 설계 용역의 공정에 반영하여야 한다. 설계자는 중간 검토에 필요한 제반 서류를 제출하고 “승인”절차를 거쳐 다음 단계로 설계를 진행하며, 서류의 제출에 따른 비용은 설계자가 부담 한다.

시행시점 : 설계용역 수행 진도에 따라 3단계로 구분하여 계획설계, 중간설계 및 실시설계의 적정성 여부를 검토

1단계 : 기본계획 완료후 (공정 20%)

2단계 : 실시설계 완료 후 최종성과품 납품전(공정 90%)

계획설계

용역내용

설계자는 상세한 사업범위를 규정하기 위하여 가능한 합리적으로 많은 검토를 해야 하며, 추정 공사비의 검토와 계약조건에 따라 추가적인 업무가 따를 수 있다.

사업의 명확한 범위에 대해 사하구의 승인을 득한 후 설계자는 요구되는 수량의 도서와 추정 공사비 산출서를 제출해야 한다.

제출서류

계획설계 작성방법에 따라 계획설계에 대하여 설계지침에서 정한 사항을 제출

관련법규 검토서 1부

현장조사 결과보고서 1부

기타 사하구가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

협의에 따라 기본(중간)설계 제출 시 일괄 제출할 수 있다.

중간(기본)설계

용역내용

계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정 ․ 보완 지시서에 따라 작성한다.

실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 한다.

주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요 구조부의 구조계산 등 구조계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

제출서류

중간설계 작성방법에 따라 중간설계도서에 대하여 설계지침에서 정한 사항 제출

기타 사하구가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

실시설계

설계자는 기본계획(계획설계) 및 중간설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설공사의 실시설계를 실시하여야 한다.

당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

공사기간 부족으로 부실공사가 발생하지 아니하도록 태풍․혹서․혹한 등으로 인한 작업 불가 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 산정하여야 한다.

기본설계와 공사비 산출서가 사하구에 의해 승인되고 실시설계의 착수가 지시되면, 계약상대자는 사하구의 공사계약에 요구되는 도서를 준비해야 한다.

설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 사하구가 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

도면과 시방서는 이용자수와 행태를 고려한 공간 요구 조건을 충족시키기 위해서 필요한 모든 정보를 포함하여야 한다. 또한 주어진 범위 내에서 입찰자들의 완벽한 건설공사 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

설계자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 사하구에 제시하고 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에 도면을 수정한다.

제출서류

실시설계 작성방법에 따라 실시설계도서에 대하여 지침에서 정한 사항

종결보고서 필요 부수

설계검사원 1부

기타 사하구가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

최종 성과품의 제출

설계자는 최종 성과품을 사하구에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 ‘공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2015-911호)’[별표2]에 의한 실시설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

설계용역 완료 후 설계도서의 미비한 사항을 보완하기 위하여 추가로 설계도서 납품을 요구할 경우 설계자는 이에 응해야하며 제반비용은 설계자가 부담하여야 한다.

도면의 분야별 협업 및 조정

설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 설계자가 책임을 지고 협업․조정하여야 한다.

설계자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종합적인 단면 계획을 수행한다.

부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 설계자가 책임진다. 설계자는 입찰단계, 시공단계, 사하구에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성한다.

시방서

설계자는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 관계 법규 및 규정에 따른 설계기준, 공종분류체계에 맞게 작성하고 자재, 입찰절차, 공사비, 공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정·보완하여야 하며 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성한다.

공사비 산출

설계자는 실시설계를 진행하면서 지속적으로 공사비를 검토하고 공사비 증액이 발생하지 않도록 노력한다.

설계자는 총 공사비 산출서를 작성하여 사하구에 제출하여 승인을 받아야 한다.

업무 수행 절차

설계자는 의문 사항이 발생 시 사하구와 긴밀히 협의하여 해결하여야 한다.

설계자는 업무 진행에 필요하거나 사하구에 의해 소집되는 업무 회의에 참석하여야 한다.

Ⅳ		설계도서 작성요령

공통사항

‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)’을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

계획설계

정의

“계획설계”라 함은 사하구로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 사하구에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

일반사항

설계자는 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 사하구의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

설계자는 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업 진행시에는 사하구의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

필요시 계획설계(안)의 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

사하구가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완 제출하여 사하구의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

계획설계(안) 작성시 포함사항

설계 설명서[현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등]

주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

우․오수처리계획

건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

조경계획

개략공사비 산정내역

측량성과도

기타 필요한 사항 및 사하구 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

현장조사방법

현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

문헌 및 서류조사

기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

현장조사

대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

측량조사방법(발주기관에서 실시한 현황측량 외에 계획상 추가 측량이 필요시 진행)

일반사항

측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독관과 협의 후 현지측량에 임해야 한다.

본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

본 지침서에 명기되지 않았으나 설계자가 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 설계자가 책임지며, 설계자 부담으로 이를 해결하여야 한다.

조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 설계자는 이를 설계자 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10% 이상 여유있게 측량해야 한다.

조사측량

현황측량(평판측량)은 제공된 측량성과도를 기준으로 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 과업면적의 10% 이상 여유로 측량하여야 한다.

측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 사하구와 협의 후 결정한다.

가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시하여야 한다.

주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

각종조사 및 계산

지적의 복제 : 기 조사된 지적도와 현황측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

계산 : 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의하여 실시한다.

표시항목

측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

중간설계

정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 사하구로부터 승인을 받는 단계이다.

일반사항

계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 사하구의 승인을 받는다.

지반(지질)조사(발주기관에서 실시한 지반조사 외에 계획상 추가 지질조사 필요시 시행)

일반사항

지질조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, NX 3공 이상)와 기존 조사내용을 첨부하여 작성 사하구의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

지질조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지질(지반)조사 위치를 정한다.

현장 시추 작업시 반드시 현장에 설계용역 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장 시추 일정을 사하구에 보고하여 사하구에서 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만, 사하구 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 사하구에 보고하여야 한다.

지반(지질)조사는 엔지니어링기술진흥법에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행 하여야 한다.

지질조사는 사하구가 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 사하구의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

설계자는 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 하고 사하구의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

지질조사 시 책임기술자를 상주하여 지질조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

지반조사 방법

지질조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지질조사를 실시함을 원칙으로 한다.

시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고 공사기간중 장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 감독관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 연암 2.0m이상까지 실시하여야 한다.

설계자는 현장 지질조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시하여야 한다.

설계자는 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

설계자는 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 관련규정 및 사하구의 지시에 따라 시행하여야 한다.

지하질의 분포상태, 연약층의 유․무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공한다.

시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 검토 및 지정하여 실시토록 하고 토층여건과 토층변화에 따라 (변화가 심할 때 등) 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

토질조사 보오링 시추 및 표준관입 시험을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 작성 제출하여야 한다.

본 조사설계의 토층, 심도, 원위치 시험, 실내시험 등은 추정한 것인바, 조사결과에 따라 설계에 맞추어 정산한다. 단 증가된 사항은 인정하지 않는다.

시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

조 사 명

조사기간

조사위치

조 사 자

시 행 자

시추번호

시추장비명

각 채취시료의 위치 및 심도

시추중에 나타난 층의 관찰

지하수위 : 시추 완료후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

코아회수율 및 천공속도

앞층 천공압력 및 비트 회전속도

기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

시추중에 판단하는 토층 및 암층분류

토층 및 암층의 심볼위치

설계자는 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합분석하여 공사비 산출 및 기초구조가 경제적이고 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성하여야 한다.

설계자는 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

조 사 명

조사시행자명

조사요약 보고문 : 수급자 대표 및 기술자의 인명날인

조사개요

조사세부내용 및 기타

지층분포상태 및 지층의 특성

지하수위 분포

표준관입시험 결과

각종 시험성과 및 분석 자료

지반정수 산정자료 및 기초지반의 지지력

시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

기초형태에 대한 제안

지질조사 보고서는 별도로 제출한다.

지반조사시험

자연시료채취

연약 점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

지하수위측정

시추공내의 지하수위는 시추완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동상태를 파악한다.

표준관입시험

표준관입시험은 KSF 2318 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시한다.

시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1.5m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

시험의 종류

함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석시험, 일축압축 등

토질시험

표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KSF 규정에 의거하여 실시한다.

암석시험

채취된 암석코어 시료에 대한 시험은 공인규정에 의거하여 실시한다.

하향식 탄성파탐사시험(다운홀 테스트)

지반의 탄성파 속도(종파 및 횡파)와 밀도 측정을 기초로 지반의 동적특성(동전단계수, 동탄성계수, 체적계수)를 파악하여 내진설계에 활용

시료상자 정리

시료상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석코아를 채취심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며, 암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

암석코아가 아닌 슬라임만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

사진촬영

조사 전․후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전 과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

기타 유의사항

계약상대자는 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

보링주상도에 사용하는 심볼(symbol) 등 각종 표시 및 기호는 표준기호를 사용한다.

계약상대자는 현장조사 및 실내시험이 완료되면 성과를 종합 분석한 보고서를 제시하여야 한다.

계약상대자는 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 하며 책임기술자가 인명 날인하여야 한다.

조사명, 조사 시행자명, 조사개요, 조사 세부내용, 조사 성과분석, 제 시험 성과표, 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

토질 및 암석시험은 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다.

설계서 구성

건축

설계보고서

공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별면적, 각층 주용도 등

현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

공사비 산정

주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

구조계획서

설계근거기준

구조재료의 성질 및 특성

제반하중조건에 대한 분석

각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

지진에 대한 고려사항 등

시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

도면종류

부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항.(잔여부지 활용계획은 별도의 배치도에 표현)

주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

대지구적도

건축면적 산출표

내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

주요시설 내부 전개도, 구조부 단면상세도

기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

토목

설계보고서

공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

시공방법

개략공사비 산정

기타 필요한 사항

구조 및 수리계산서

구조계산서

수리계산서

지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물

개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

도면종류

위치도

종단면도 및 횡단면도

평면도

구조물도 및 부대시설도

유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

조경

설계보고서

공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

개략공사비 산정

기타 필요한 사항

개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

도면종류

위치도

조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

실시설계

정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 사하구의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

일반사항

중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

납품 전에 사하구가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.(검토용 도서 제출일자 사하구와 협의)

최종 납품도서는 반드시 발주청의 사전 검토 후 최종 제출해야하며 사전 승인을 득하지 않은 설계도서는 납품도서로 인정하지 않는다.

설계서 구성

건축

설계 설명서

공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

세부시공방법

공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

건물의 색채사용계획

공정계획(공정표 포함)

기타 필요한 사항

구조계획서

설계근거기준

구조재료의 성질 및 특성

제반 하중조건에 대한 분석

각부 구조계획

구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

지진에 대한 고려사항 등

구조계산서

시방서

당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

도면종류

부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

조감도(투시도) : 천연색채 사용

도면 목록표

배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 잔여부지 활용계획, 기타 시공에 필요한 사항

부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

구적도

건축면적 산출표

내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

토목

설계보고서

공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

세부시공계획 및 자재사용계획

세부공정계획

세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

구조 및 수리계산서

지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

시방서

도면 종류

위치도

종단면도 및 횡단면도

평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

기타 시공에 필요한 사항 일체

공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

조경

설계보고서

공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

세부시공계획

자재사용계획

세부공정계획

세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

시방서

도면 종류

배치도

종단면도 및 횡단면도

평면도

조경시설물 배치도

기타 시공에 필요한 사항 일체

공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

분야별 설계지침

[기계분야]

1. 과업내용

기계공사 1식

2. 용역범위

가. 현황조사 및 자료수집

나. 실시설계

다. 사업시행 관련 제반 행정절차 이행에 따른 필요한 설계도서 작성

라. 기타 본 과업지시서에 정하는 사항

3. 관계법규 조사(해당분야 반영)

가. 소방법령 및 관련법규

나. 하수도법령 및 관련법규

다. 위험물안전관리법령 및 관련법규

라. 도시가스사업법령 및 관련법규

마. 주차장법령 및 관련법규

바. 에너지이용 합리화법령 및 관련법규

사. 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법

아. 실내공기질 관리법규 및 관련사항

자. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

차. 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시)

카. 수도법령 및 관련법규 등

타. 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법규 및 관련사항

파. 한국 산업규격

하. 기타 본 건축물 건립을 위한 제반 법규

거. 소방시설 등의 성능위주설계 평가 가이드라인

4. 기본방향

가. 수질오염 및 대기오염의 억제나 방지에 대한 대책을 고려한다.

나. 건축, 전기 등 관련된 타 공사분야의 긴밀한 협조하여 건축물 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 한다.

다. 보수 및 유지관리가 용이하여야 하며 장래 증설이나 변경 및 개․보수에 대한 적응성이 있어야 한다.

라. 설비방식은 설비시스템의 생애주기(Life Cycle)를 고려하여 LCC 분석 및 VE 검토 결과를 바탕으로 선정하여야 한다.

마. 자동제어에 의한 운전관리를 통하여 업무효율 극대화 및 인력절감을 기한다.

바. 에너지 절약을 극대화 할 수 있는 최적 설비방식을 추구한다.

사. 관계법령의 규정을 준수하여 설계서를 작성한다.

아. 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성하여야 하며, 타분야(건축, 전기, 설비 등)별 도면(평면도, 단면도) 간섭여부를 체크하여야 한다.

5. 기본설계 용역수행

다음 소요시설에 대하여 검토하고 설계에 반영한다.

가. 냉․난방 공조 설비

1) 건축물 규모, 용도에 맞는 냉․난방방식 검토설계

2) 각 실별 부하조건 및 에너지 절약형 공조방식 검토설계

3) 기계실 장비 및 기기의 적정배치

4) 이용 인원을 감안하여 효과적인 공조방식 검토설계

5) 실별 특성에 따른 항온항습 및 클린룸 검토설계

나. 열원설비

1) 고효율 기기 채택 등 시스템의 에너지 효율 향상 방안 검토설계

2) 유지관리가 용이한 장비 배치 및 장비반입을 위한 공간계획 검토설계

3) 적절한 소음 및 진동 방지대책 검토설계

4) 열원설비와 신재생에너지와의 호환성 검토설계

다. 위생설비

1) 재질, 규격 선정 시 부식과 수압을 감안한 검토설계

2) 전기실, 변전실, 작업실 등을 통과하지 않도록 배관경로 검토설계

3) 위생설비 및 관련배관은 소음을 최소화 하도록 자재 및 배관 경로 검토설계

4) 겨울철 배관 동파방지 대책을 반영해야 한다.

라. 소방 설비

1) 화재발생시 초기진압 능력 및 연기확산 최소화 계획

2) 유사시 인명피해 최소화 및 건물의 안정성 강화

3) 각 실 및 용도별 소방 설비 기준에 적합하게 설계

4) 각 설비를 중앙방재시스템에서 조작․감시가 가능토록 검토설계

5) 소화설비용 수원의 수질이 법적 수질기준에 부합되도록 수질 오염 방지 및 사수 방지대책 검토 반영설계

마. 환기설비

1) 대기실, 사무실, 기계실 등 실별 환기방법 검토설계

2) 환기방법을 에너지절약대책과 함께 검토설계

3) 바이러스, 세균 등의 실내 간 확산 방지방안 검토설계

바. 자동제어 및 중앙감시설비

기계, 전기 등 통합 감시제어방식 검토설계

사. 급․배수 설비

1) 급수방식은 수압, 수질, 수량 등을 고려하여 최적의 방식을 선정하고 펌프의 동력을 최소화 할 수 있도록 계획을 한다.

2) 급수관 인입에 따른 도로굴착 및 분담금사항 등 관할 수도사업소와 사전협의 검토설계(상수도 공급가능 협의 등)

3) 급․배수관로는 주요 작업실의 통과를 피하고 배수관은 방음 재질 사용할 것

아. 도시가스 설비

1) 가스 관련법규에 적법하게 검토설계

2) 가스관 인입에 따른 도로굴착 및 분담금 사항 등 가스공급 사업자와 사전 협의 후 검토설계

자. 오수정화 설비

1) 관련법규에 따라 건축물 규모 및 지역특성을 감안하여 오수처리 방식 검토설계(자연환경 피해 최소를 위한 최적 오수처리시설 반영 등)

2) 오수시설 악취가 충분히 배기될 수 있도록 환기시설  도입

차. 주방설비

주방기구 설치여부 검토

카. 기타사항

1) 각 설비의 방진․방음 및 내진에 대책 검토설계

2) 배관피트는 방음과 방충, 보온을 위해 밀폐형으로 구성하고 충분한 공간을 확보한다.

3) 환기는 실별 특성에 맞추되 1, 2, 3종 환기와 방음, 클린룸 항온항습을 적절히 구성한다.

6. 설계 설명서 및 기본설계도면 작성

가. 본 과업지시서에서 제시하는 기본설계에 관한 모든 사항을 종합적으로 정리하여 각 공종별로 작성한다.

나. 설계계산서에는 간이 부하계산서 및 주요장비에 대한 개략적인 용량 산출서를 포함한다.

다. 설계 설명서에는 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 주요기계설비(공기조화, 위생, 소화, 가스, 자동제어 등) 현황, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항, 주요 시공계획, 예정공정계획 등의 내용을 포함하여 작성한다.

라. 설계도면은 국토교통부 고시 설계도서 작성기준에 의거 장비일람표 등 일반 사항과 배치도, 계통도, 평면도, 단면도, 옥외공동구 등을 작성한다.

7. 실시설계 용역수행

다음 소요시설에 대하여 검토하고 설계에 반영한다.

가. 냉․난방 공조 설비

1) 공조조건별(부하특성, 사용시간, 방위 등)로 구역 분할제어가 가능한 시스템 검토설계

2) 층높이가 높은 실은 건축과 충분히 협의하여 공조방식 선정 설계

3) 각 설비는 기기별 특성과 이용인원, 사용시간 등에 따른 부하계산

4) 각 설비의 특성을 고려한 공조방식 선정

5) 배기열 등 폐열을 재이용하는 에너지절감 시스템 검토

6) 시스템별 LCC분석

나. 열원설비

1) 열원기기 및 부대 장비류는 부하운전효율이 좋은 것을 선정하고, 부하조건에 따라 최고의 성적계수를 유지할 수 있도록 대수 분할 또는 비례제어가 가능토록 검토설계

2) 건축물 용도 및 특성을 감안한 열원방식 검토설계(시스템에어컨, 심야전력 이용방식 등)

3) 태양열, 지열 등 신․재생에너지의 시스템별 LCC 분석

다. 위생설비

1) 절수형 저소음 위생설비 사용 검토

2) 급수공급 방식에서 수압 및 각 실별 관말수압에 대한 충분한 검토 (수압손실)와 오․배수설비 (배수구와 연결문제) 검토설계

3) 급탕은 순간 온수방식 또는 저탕식 등 검토

라. 소방 설비

1) 화재발생 시 피해를 최소화 할 수 있도록 하고, 소방법령에 적합한 방재시설 검토설계 (반드시 관할 소방기관 사전협의 및 설계도서 작성)

2) 소화설비용 수원의 수질이 법적 수질기준에 부합되로록 수질 오염방지 및 사수 방지대책 검토 반영설계

3) 소방시설 등의 성능위주설계 평가 가이드라인 검토설계

마. 환기설비

1) 각 실의 정․부압검토

2) 실내 공기 질 향상 및 환경부하 발생 최소화 방안

바. 자동제어 및 중앙감시설비

1) BUILDING AUTOMATIC SYSTEM에 대한 각 그룹(실)별 제어방식을 검토설계

2) 기계, 전기 분야 통합 중앙감시 제어방식 검토설계

3) 자동제어와 기계설비 공종 간 구분이 용이하도록 설계도면에 공사범위 표시

사. 도시가스설비

1) 도시가스 사용예상량을 파악하여 해당지역 가스공급자와 사전 협의하여 기본계획 검토설계

2) 인입가스관(주관⇒기계실)은 비노출로 설계하고, 정압기실은 주 통로 등 동선을  감안하여 설치위치 검토설계

3) 경보장치, 유량계 및 가스관 재질 등 적정여부 검토설계 (반드시 가스안전공사 사전협의 및 설계도서 작성조치)

4) 도시가스 인입 분담금 파악 및 내역 반영

아. 오수정화시설

1) 환경부 고시에 따른 오수량, 수질, 처리방식 및 차집관로의 연결 검토설계

2) 처리장 악취는 충분히 배기될 수 있도록 환기량 검토설계

자. 주방설비

수용인원 감안하여 적정용량 및 기기종류, 충분한 공간 확보 검토, 음식물 조리 시 취기 확산 방지를 위한 환기설비 구비 검토

차. 기타사항

1) 냉․난방기 실외기는 주 통로 등 동선을 감안하여 설치위치 검토설계 (건축설계자 협조를 통한 실외기 전용구역 지정조치)

2) 건축, 전기 등 타 공종 간 누락, 중복, 간섭여부의 면밀한 검토 및 도면상 공종 구분이 될 수 있도록 작성할 것

3) 장애인 이용 화장실 등 편의시설은 관계 법령 등에 맞게 검토설계

4) 각 장비 및 배관, 닥트 등에 대한 방음, 방진 검토설계

5) 공조 소음이 불가피한 경우에는 흡음닥트 반영설계

8. 기타 유의사항

가. 본 사업와 유사한 용도의 우리시 및 타 도시의 적용되어 있는 설비방식을 충분히 검토, 분석하여 미비점, 문제점을 보완할 수 있는  방식을 선정하여야 하며, 특히, 급수원 확보 및 오수 처리와 관련하여 적정 대책을 강구 반영하여야 한다.

나. 건축, 토목, 전기 등 타 공사(공정)와 연관되는 부분을 면밀히 검토, 설계에 반영하여 기계설비의 원활한 기능을 유지하도록 설계하고, 향후 운영자의 입장에서 설계하여 각종 하자 등에 능동적으로 대처할 수 있도록 한다.

다. 최신기술 적용으로 준공 후 기술 환경의 변화에 따른 설비방식의 상대적 낙후성을 방지하고, 차후 설비의 유지보수 및 설비방식의 교체가 용이토록 설계한다.

라. 노출되는 설비는 건축 미관과 조화가 되도록 검토하고 내부의 설비는 내장공사를 검토하여 설계한다.

마. 기계실, 피트층 및 장비반입구 등은 유지보수가 용이하도록 적절한 공간을 확보하여야 하며, 기본설계 시 감독관과 사전 협의하여 설계에 반영한다.

9. 설계 설명서

가. 기계설비 개요

나. 선정내용

다. 용역의 특수성

라. 국내외 유사 설비 현황

마. 공사개요

바. 주요 설비 내용

사. 주요 유틸리티 설비 : 전력, 물, 냉동, 펌프, 공기조화, 증기, 압축공기 배선, 배관, 기타설비

아. 에너지절감 및 유지관리에 관한 사항

자. 신․재생에너지에 관한 사항

차. 세부시공 및 세부공정계획

카. 기타 필요한 사항

10. 기계설비 설계도면 관련 지침

가. 계통도

주요 기계장비 및 유틸리티 설비의 자동제어시스템, 공기조화, 급․배수(급탕포함), 소방, 기타 설비의 세부 계통도

나. 평면도

1) 각종 설비평면도 및 확대평면도(급․배수시설, 공조실, 냉․난방설비, 위생시설, 도시가스시설, 소방시설, 자동제어시설 등)

2) 기계실 도면은 전체배관도 작성 후 급수, 급탕, 보급수, 냉․온수, 냉각수 등 각 배관별 분리하여 도면 작성하고, 열원 흐름도를 냉열원 및 온열원으로 구분하여 도면 작성한다.

다. 옥외 공동구(해당 시)

옥외 공동구 관리 및 각종 설비평면도. 단면도(확대도면) 포함

라. 각 장비별 상세도 및 연결 상세도(해당부분)

1) 냉동기, 냉각탑, 펌프, 공조기, 휀, 보일러, 헤드 등 상세도 및 배관 연결 상세도

2) 기타 발주청 요구 각종 상세도

3) 설계자는 장비 배치 시 감독관과 협의하여야 한다.

마. 기타 필요한 사항

제작품 설명서, 조작반 사양 및 기타 참고자료 등 발주청 요구사항

바. 설계도서는 국토교통부 설계도서 작성기준에 의거해서 작성토록 하고, 특히 설계도면상에는 도면작성 관계자(설계자, 제도자, 임기술자 등)가 실명 날인 후 납품되어야 한다.

11. 각종 부하계산서 등

가. 각 장비별 기계설비 용량 및 냉난방 부하계산서

나. 가스부하 계산서(월 사용예정량 산출계산서, 관경 산출계산서 등)

다. 소화설비 계산서

라. 연간 유지비, 운전비 산출서 등 발주청 별도 요구 시 제출

마. 관련 참고서적 요구 시 제출

12. 기본 설계서 구성

가. 설계 설명서

설비 대략 공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나. 시방서

실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주청으로부터 지침을 받아 작성)

다. 설계 계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라. 도면종류

1) 범례 및 도면목록

2) 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

3) 배치도 : 상･하수도 연결관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

4) 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

5) 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도  냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도, 소화 설비 평면도

6) 단면도: 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

7) 기구 상세도

8) 옥외 공동구: 관로 및 각종설비 평면도

9) 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

10) 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

13. 실시 설계서 구성

가. 설계 설명서

난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서, 소방시설 법적기준 등

나. 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

다. 설계 계산서

부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서(위생, 오･배수, 가스배관), 공조장비 선정서(습공기선도에 공기상태 표기), 소방시설 법적기준, 필요시 견적서 등

라. 도면종류

1) 도면목록표, 범례

2) 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

3) 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

4) 계통도: 공조, 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

5) 평면도: 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도

6) 단면도: 시공에 필요한 사항(엘리베이터 건축단면도 포함)

7) 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

8) 기타 필요한 도면

마. 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

[전기 분야]

1. 과업내용

전기공사 1식

2. 과업범위

가. 본 사업의 전기시설물 설치

나. 관계관서(한국전기안전공사, 한국전력공사 및 지자체 등)의 수속(허가, 신고, 검사 등) 등

다. 각종 보고서 작성

3. 적용법규 기준

가. 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법 및 같은 법 시행령․시행규칙

나. 에너지이용 합리화법 및 같은 법 시행령․시행규칙

다. 전기용품 및 생활용품 안전관리법 및 같은 법 시행령․시행규칙

라. 한국전기설비규정 및 한국전기설비규정 판단기준

마. 한국전력공사 전기공급 약관

바. 대한전기협회 내선규정 및 배전규정

사. 한국산업규격(K.S)

아. 국토교통부제정 각종 표준시방서 및 설계기준, 우리 구에서 제시하는 건설공사 설계지침서

자. 도로법 및 가로등, 보행등 관련 법령 및 부산광역시 기준, 지침 등

차. 경관법 및 같은 법 시행령, 각종지침, 가이드라인 지침 등

카. 인공조명에 의한 빛공해 방지법 및 같은 법 시행령․시행규칙

타. 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 등 에너지 절약 관련 법령

파. KEC(한국전기설비규정), 건축전기설비 내진설계 시공지침서

하. 고장전류계산서(3상단락전규 및 1선지락전류)

거. 접지설계도면(계통접지방식계통도, 접지극 형상 및 제원, 접지상세도)

너. 접지계산서(대지저항율측정, 지질분석자료, 접지계산FOCTOR요약, 접지설계 결과서)

더. 저압보호장치 및 전선의 단면적 선정 계산서(감전보호, 과전류보호, 전선단면적)

러. 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련법규 등

3. 설계도서 작성 지침

가. 일반사항

1) 설계도면과 시방서등에 표기되는 내용(재료, 규격, 성능, 기준, 공법 등)은 서로 상이하지 않도록 하여야 한다.

2) 성과품 작성 시 장비의 성능유지 및 보수, 특수공법 등에 대한 상세한 설명 및 각종 주요사항에 대한 기록 유지, 산출근거 등을 정확하게 기록하여 운영 시 기술적 참고 자료로서 가치가 있도록 한다.

3) 특수공법, 특수자재인 경우 외국의 기준을 준용할 수 있으나 관계 법령 및 관련사항을 충분히 검토 후 작성한다.

4) 특수공법, 특수자재에 대해서는 설계방법과 시험결과, 시공실적 등에 대해 기술시방서에 기술된 개요 외에 설명서 및 참고자료를 첨부하여야 한다.

5) 실시설계의 과업내용에 따라 설계보고서, 설계도면, 시방서, 공사비 내역서 (수량 및 단가산출서, 단가비교표, 견적서 등), 전기설계 계산서(전력간선 및 분기회로 계산서, 적용전선규격 및 허용전류 계산서 등)를 작성한다.

나. 세부내용

1) 설계 도서를 작성함에 있어 각종 상세 도면을 충분히 작성하여 시공 및 적산이 용이하도록 하여야 하고 각 공정별 건축, 전기 등 시공한계(책임)분을 도면에 구분 명기하여야 한다.

가) 각부의 치수는 명확히 표기

나) 각종 자재의 명칭, 품질, 규격, 형태의 표기

다) 토목, 기계설비, 전기, 소방 등과 관련 각 공사와의 구분 표기

라) 접합부의 구조상세도

마) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있는 상세도

바) 도면 이해를 위해 주지사항 명기

사) 계통설명서(각종 설비계통의 명확한 표기)

아) 내진대책 및 구성도

자) 설계도면 표기 기호 및 방식은 제반도면 총칙에 의한다.

2) 공사시방서를 작성함에 있어서는 사업개요, 시공방법 등에 관하여 상세히 기술하고 일반시방서에 포함되지 않은 사항을 기재한다.

가) 사용재료의 규격, 품질, 색상, 질감등과 관리(시험, 운반, 보관 등)등에 관한  사항

나) 각종 자재의 설치방법

다) 각종 가 시설(가설건물, 울타리 등)에 관한 사항

라) 관련공사(기계설비 등)와의 시공관계 부분

마) 각종 구조공법에 관한 사항 및 이에 따른 가 시설과 중장비에 관한 사항

바) 재료의 배합과 양생에 관한 사항

3) 시방서

가) 시방서를 작성함에 있어서는 일반시방서와 특기시방서로 구분하여 작성하되 일반시방서는 사업개요, 시공방법 등에 관하여 상세히 기술하고 특기시방서는 일반 사항에 포함되지 않는 사항을 기술하여야 한다.

나) 사용재료의 규격, 품질, 색상 등 (시험, 운반, 보관)에 관한 사항

다) 각종자재의 설치방법에 관한 사항

라) 도면에 명기 할 수 없는 사항의 설명

4) 각종 계산서 등

본 과업에 관련된 부하, 전압강하, 조도(휘도), 구조계산서 등 각 분야의 기술적 계산서는 관계 규정에서 정한 내용에 의거하여 관련 전문가가 작성하고 반드시 작성자가 날인하여야 한다.

4. 기본 설계서 구성

가. 설계 설명서

1) 전기설비개요: 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

2) 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명: 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

3) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

4) 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

5) 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

6) 예비전원에 대한 검토

7) 에너지 절약 방안에 대한 설명

나. 계산서

1) 각 실별 조도계산서

2) 부하산출서, 수배전 설비용량 계산서, 전압강하 계산

3) 기타 계산서 및 관계자 협의 내용

다. 시방서

각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라. 도면종류

1) 현장 안내도

2) 범례 및 도면목록표

3) 평면도

4) 옥외간선도: 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

5) 수변전 설비도: 각종 기기의 배치계획도

6) 각종 설비의 계통도: 전력, 방재, 기타 설비의 계통도

7) 각종 설비의 배치도: 전등, 전열, 동력, 방재설비 기타 설비 배치도

8) 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5. 실시 설계서 구성

가. 설계 설명서

1) 전기설비개요: 각 설비(전력,통신,소방,약전,T.V.공청 기타 설비)에 대한 설명

2) 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명: 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

3) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

4) 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에  대한 설명

나. 계산서

1) 각종 계산에 적용한 계산기준 공식

2) 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

3) 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

4) 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블트레이 및 덕트 규격 계산서

다. 시방서

1) 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

2) 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의 사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

라. 도면종류

1) 도면목록표, 현장 안내도

2) 범례 특기사항: 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

3) 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

4) 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

5) 옥외간선도 : 전력통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반 간선의 정격설치방범, 설치상세도 등

6) 수변전 설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

7) 각종 설비의 계통도 : 전력간선･통신･소방 등 시공에 필요한 사항

8) 각종 설비의 배치도 : 전력･통신･소방 인입 배치도 등 시공에 필요한 사항

9) 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항

10) 평면도 : 전기실 장비설치, 기계실 장비설치, 전력･조명･통신･방범･소방･방송 설비 등 시공에 필요한 사항

11) 단면도 : 시공에 필요한 사항

12) 기타 필요한 도면

마. 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

[정보통신분야]

1. 과업의 범위

정보통신공사 1식

(구내통신선로설비, 방송공동수신설비, 통합배선, 방송설비, CCTV설비, 주차관제설비 등)

※ 기타 본 과업지시서에 명기되지 않은 사항 또는 구체적인 사항은 발주청 담당자와 협의하여 진행하여야 함.

가. 실시설계

나. 사업시행 관련 제반 행정절차 이행에 따른 필요도서 작성 등 기타 정보통신 공사에 수반되는 제반 사항

다. 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항

1) 용역보고회 등을 통한 제반 검토 및 보완사항을 거쳐 최종 실시설계에 반영한다.

2) 사업부지 내 지장물 철거 및 처리 관련 내역서 작성 등 제반사항을 과업에 포함한다.

2. 설계 검토내용

가. 통합배선설비

1) 국선 및 내선 용량계산, 충분한 운영관리 공간(통신실) 확보 검토

2) 최단거리의 국선 인입경로 확정

3) MDF, IDF, 국선단자반등 층별 운영 설치를 위한 위치 선정

4) 사무실 면적 및 용도에 맞게 선로 구성

5) 시스템박스(전화수구)의 예비를 고려한 간선확보 검토

나. 네트워크(LAN)설비

1) 네트워크 운용을 위한 통신장비 선정 및 운영 공간 확보 검토 설계

2) 정보시스템(전자결재, 인터넷 등) 운용을 위한 네트워크망 구성도에 적합한 시스템검토설계

3) 사용인원(상주) 및 용도에 적합한 회선 수 선정

다. TV(CATV) 공시청설비

1) 종합유선방송구내전송설비 규정에 의한 CATV(HAED END) 시스템 수신방안 검토 및 설비 선정

2) 낙뢰 및 강전류전선과의 접촉 등으로 인한 이상전류전압의 유입을 방지할 수 있는 안테나 보호설비 검토

라. A/V(방송,영상)설비

1) 화재발생 및 비상시에 필요한 방송 시스템 검토 설계

2) 전관방송 설비는 앰프출력이 스피커출력의 약 30%정도 예비출력을 확보토록 설계

3) 각 설비는 사용 장소에 따라 실내용적과 음의 잔향시간을 검토 설계

4) 설비 설치목적별, 장소별을 검토 적정한 SYSTEM이 구축되도록 검토 설계

5) 세미나실, 회의실 등에는 영상시스템 검토 설계

6) 영상설비는 사용목적 및 밝기 등을 고려하여 적합한 시스템으로 설계

마. 방범설비(CCTV)

1) 주요 시설물 상시 감시를 위한 CCTV 시스템 검토설계 및 운영 장소 확보 검토

2) 주요 출입구 등 CCTV카메라 설치위치 선정

3)) 추후 설비확장 검토 설계

바. 주차관제 시스템

1) 무인정산 처리 구성방안

2) 입구 및 출구 장비규모 선정

사. 기타설비

1) 운영상 필요하다고 판단되거나 현 운영부서 요구사항 및 기존 인프라 연계시스템 등 주요사항 검토 반영

3. 실시 설계서 구성

가. 설계 설명서

1) 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)에 대한 설명

2) 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명: 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

3) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

4) 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

5) 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나. 계산서

1) 회선용량계산서, 전계강도계산서, 교환기용량계산서

2) DVR 용량계산서

다. 시방서(자재시방서)

1) 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라. 도면종류

1) 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)  - 범례 : 사용될 기호

2) 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

3) 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

4) 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

5) 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

6) 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

7) 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 (블럭다이어그램 포함)

8) 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항

9) 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항

10) 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항

11) 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체 - 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

12) 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마. 공사비 산출서

수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

4. 관련법령

가. 건축법 및 건축 관계법령 기준

나. 소방관련 법령 기준

다. 주차장법 및 주차장 관련 제반 법령

라. 전기사업법, 전기공사업법, 전기통신기본법

마. 정보통신사업법, 정보통신공사업법

바. 전파법

사. 소프트웨어산업진흥법

아. 개인정보보호법, CCTV 설치 관련 지침

자. 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정 등 관련 기술기준

차. 방송법

타. 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련기준 등

[소방(기계·전기)분야]

1. 과업범위

소방(기계, 전기)공사 1식

가. 소방시설물 설치를 위한 현황조사 및 자료수집 등 실시설계

나. 사업시행 관련 제반 행정절차 이행에 따른 필요도서 및 각종보고서 작성 등 기타 소방공사에 수반되는 제반 사항

다. 관계관서의 수속(허가, 신고, 검사 등) 등

라. 기타 본 과업지시서에서 정하는 사항

2. 실시설계 용역수행

가. 설계자는 각종 심의 및 협의내용을 설계에 반영하여야 하며, 각종 공법에 대하여 발주청과 충분히 검토한 후 결정하여야 한다.

나. 실시설계는 사용자(이용자) 개념이 설계도서에 구체적으로 표현되어야 하므로 실현 불가능하거나 제 법규 규정에 저촉되어서 공사 시행 불가능한 내용이 되어서는 아니 되며, 각종조사를 실시하여 그 결과를 실시설계에 반영하여야 한다.

다. 설계의 합리성, 구조물의 안정성, 기기의 안전성 및 설치시설의 적정성 등에 관한 기본사항 조사, 검토 및 결정하여야 한다.

3. 관련법령

가. 건축법 및 건축 관계법령 기준

나. 소방관련 법령 기준

다. 주차장법 및 주차장 관련 제반 법령

라. 에너지이용 합리화법

마. 하수도법

바. 에너지이용합리화법 및 동 시행령, 동 시행규칙

사. 소프트웨어산업진흥법

아. 전기, 전력 등 관련 법령 기준

자. 부산시, 우리 구 건설공사 설계지침 및 관련자료

차. 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련기준 등

4. 기타사항

가. 건축소방설비공사 표준시방서에 준하여 상세히 기술하고, 안전 관리대책을 비롯한 공사 관련 필요한 사항과 유의하여야 할 일반적인 사항을 시방서에 명기한다.

Ⅴ		성과품의 납품목록

1. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하고 다음 사항은 정하는 바에 따라 납품하고

2. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	3	부	개략적조감도
2	현장조사보고서	A4	2	부	유사시설 견학 보고서 포함
3	현황측량성과도		2	부
4	관련법규 검토서	A4	2	부
5	공사비 검토서	A4	2	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인
6	각종 심의·자문 제출도서				도서규격 및 부수는 심의 · 자문 기준에 따라 별도 통보
※ 그 외 도서는 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제10조 ②항 [별표2]의 중급 기준으로 작성·제출할 것

위 제출목록 전부를 USB저장장치로 제작하여 제출

납품 수량은 필요시 발주처가 추가 요구 가능하며, 설계자는 이에 협조하여야 한다.

3. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서 (관급내역서)	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	계 산 서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	2	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전문, 관급 시방포함
6	지질조사보고서	A4	2	부		◯
7	녹색건축인증 관련검토서	A4	1	부
8	에너지효율 등급인증 관련검토서	A4	1	부
9	제로에너지 건축물 인증 관련 검토서	A4	1	부
10	장애물없는 생활환경인증 관련검토서	A4	1	부
※ 그 외 도서는 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제10조 ②항 [별표2]의 중급 기준으로 작성·제출할 것

건축도면에는 건축, 토목, 조경을 포함하여 제본한다.

기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

위 제출목록 전부를 USB저장장치로 제작하여 제출

납품 수량은 필요시 발주처가 추가 요구 가능하며, 설계자는 이에 협조하여야 한다.

4. 실시설계 납품도서

가. 실시설계 검사원

나. 실시설계 종합보고서

1) 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고, 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각실 면적 및 기능과 시설개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하여야 한다.

2) 설계용역 완료 후 설계도서의 미비한 사항을 보완하기 위하여 추가로 설계도서 납품을 요구할 경우 설계자는 이에 응해야하며 제반비용은 설계자가 부담하여야 한다.

3) 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 되며 다음 사항을 수록하여야 한다.

가) 과업의 목적

나) 과업의 범위

다) 과업의 내용

라) 사전 조사내용 요약

마) 설계기준

바) 구조물 설계안별 검토내용

사) 세부설계내용 (공종별 비교검토 내역포함)

아) 주요자재 및 수급계획

자) 시공계획

차) 도면첨부

카) 기타 참고자료 및 우리 구의 요구사항

다. 공사예정공정표

라. 건축협의서

마. 각종 예비인증서 및 평가서 (건축물 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경, 제로에너지 예비인증 등)

바. 각종 예비인증 납품도서 (에너지 절약계획서, 건축물 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경, 제로에너지 예비인증 등)

사. 공사별 현장설명서(A4)

아. 조감도(A1 이상, 표구 포함)

자. 참여기술자 현황 (공종, 기술자격, 참여기간 등)

차. 판넬 (A2 크기로 제작하고, 설계개요, 조감도, 입면도, 건물배치도, 각층 평면도, 종, 횡단면도 순으로 편집하고, 원본 제출 전 필히 감독관의 승인을 득하여야 한다.)

카. 공종별 실시설계서 제출 목록 (상세) : 납품 전 감독관 확인

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	소방	통신
1	최종보고서	A4	1	부	○	○	○	○	○	○	○
2	설계설명서	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○
3	설계도면	A3	6	부	○	○	○	○	○	○	○
4		A2	2	부	○	○	○	○
5	계산서	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○	- 구조/각종 설계계산서 - 관계전문기술자 서명날인 필할 것
6	설계내역서	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○
7	관급내역서	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○
8	공내역서 (물량 내역서)	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○	파일로만 제공
9	수량산출서	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○
10	단가산출서 (단가대비표)	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○	- 견적서포함
11	일위대가표	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○
12	일반시방서	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○	- 자재목록표 포함
13	특기시방서	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○	- 자재목록표 포함
14	관급시방서	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○	- 자재목록표 포함
15	각종 자재목록 관련자료	A4	6	부	○	○	○	○	○	○	○
16	조감도	A1	3	부	○							․표구포함(0.6m*0.9m이상)
		A4	5	부	○							․
17	공정표(CPM/PERT)		6	부	○	○	○	○	○		○	- 전 공종 포함
18	기타 발주청 요구사항		6	부	○	○	○	○	○	○	○
19	에너지절약 계획서		1	부
20	각종 관계법령 인허가 승인 서류		1	부								- 에너지관리공단 사전협의서 포함
21	기계설비분야 각종 부하계산서		6	부	○	○	○	○	○	○	○
22	장애물 없는 생활환경 예비인증 심사 도서(예비인증서 포함)		1	개								- 예비인증서 CD(또는 USB)에 포함
23	판넬	A2	2	부								- 납품 전 감독관 반드시 확인
24	USB		2	SET	○	○	○	○	○	○	○	- 실시설계 전체내용

▶ 총괄 : 건축, 토목, 기계, 전기, 소방 등 모든 공사

※ 설계도면의 경우 한 페이지당 도면 한 개를 원칙으로 한다.

※ 도서작성구분에 따른 세부적인 설계도서의 내용은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위」 별표2 ③의 도서작성의 구분 중 “중급”을 적용한다.

※ 설계도면 및 시방서는 아래 제출서류 이외에 조달청에서 선정된  USB 저장프로그램으로 저장된 USB로 제출하여야 하며, 내역서는 아래 제출서류 이외에 조달청에서 시설공사 응용프로그램으로 선정된 프로그램으로 작성된 USB로 제출하여야 한다.

※ 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

※ 설비, 자재 관련하여 제품의 카달로그, 취급설명서 등을 첨부한다.

※ 기타 우리 시에서 요구하는 성과품과 설계내역서 중 단가 미기재 내역서의 수량은 별도 감독원의 지시에 의한다.

※ 납품 전 반드시 감독관의 확인을 받아야 하며, 확인을 받지 않은 채 제출할 경우 납품도서로 인정하지 않는다.

Ⅵ		붙임자료

[붙임 1] 보안각서

[붙임 2] 책임기술자 선임계 서식

[붙임 3] 용역수행계획서 참여기술자 명단 서식

[붙임 4] 하도급 승인 요청서 서식 (하도급 신청 자기검토서)

[붙임 5] 주간공정보고 서식

[붙임 6] 월간공정보고 서식

[붙임 7] 청렴이행서약서 서식

【붙임 1】

보  안  각  서

1. 용 역 명 : 사하구 보훈회관, 치매안심센터등 복합시설 건립 사업 건축설계 용역

2. 계약일자 :

3. 착수일자 :

4. 준공예정일 :

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업수행중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제9조 2호(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

4. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 의거 발주청에게 귀속됨을 알고 별도로 발주청의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2024.  .   .

주        소 :

생 년 월 일 :

기 술 분 야 :

성        명 :                   (인)

부산광역시 사하구청장 귀하

【붙임 2】

책 임 기 술 자   선 임 계

1. 용 역 명 : 사하구 보훈회관, 치매안심센터등 복합시설 건립 사업 건축설계 용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2023.   .   .

4. 착수일자 : 2023.   .   .

5. 준공예정일 :

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 생 년  월 일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술       자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2024.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

부산광역시 사하구청장  귀하

【붙임 3】

용역수행계획서 참여기술자 명단

ㅇ용 역 명 : 사하구 보훈회관, 치매안심센터등 복합시설 건립 사업 건축설계 용역

ㅇ용역기간 :

ㅇ용역회사 :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격증번호

【붙임 4】

하도급승인 요청서

1. 용 역 명 : 사하구 보훈회관, 치매안심센터등 복합시설 건립 사업 건축설계 용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 :

4. 착수일자 :

5. 완수예정일 :

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 :  1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

4. 하도급 신청 자기검토서(다음페이지의 붙임 참조)

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 관련서류를 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2024.  .   .

주        소 :

생 년 월 일 :

기 술 분 야 :

성        명 :                   (인)

부산광역시 사하구청장  귀하

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하도급 분야
하도급계약일			승인요청 (통보)일
착수일자			완수일자
수 급 인			하수급인		연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정		하도급 신청내용		검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업기본법 시행규칙 제27조의 2
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 기술용역(설계)계약특수조건 제5조

【붙임 5】

주 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 :      년  월  일 ～      년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(2024. . .)	금주예정사항(2024. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주        소 :

생 년 월 일 :

기 술 분 야 :

성        명 :                   (인)

부산광역시 사하구청장  귀하

【붙임 6】

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 :        년  월  일 ～        년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2024. . . ∼ 2024. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주        소 :

생 년 월 일 :

기 술 분 야 :

성        명 :                   (인)

부산광역시 사하구청장  귀하

【붙임 7】

청 렴 이 행 서 약 서

○ 용 역 명 :

	당사는 ‘부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정'이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제6조의2에 따라 부산광역시 사하구에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 계약 체결 및 입찰에 참여할 때 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행하는 자를 포함)의 임직원과 대리인은
	1.	입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위 등 어떠한 불공정한 행위도 하지 않겠습니다.
		○	이를 위반하여 경쟁입찰에서 담합을 주도하여 낙찰을 받은 것이 사실로 드러날 경우 부산광역시 사하구에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,
		○	경쟁입찰에서 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 부산광역시 사하구에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 1년 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
		○	경쟁입찰에서 입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 것이 사실로 드러날 경우 부산광역시 사하구에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 6개월 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
		○	위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.
	2.	입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 법 제16조에 따른 감독, 법 제17조에 따른 검사와 관련하여 관계 공무원에게 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며,
		○	이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 2억원 이상의 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 2년 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
		○	1억원 이상 2억원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 1년 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
		○	1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 6개월 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
		○	1천만원 미만의 뇌물을 준 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날부터 3개월 동안 입찰에 참가하지 않겠습니다.

	3.	입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.
4. 공정한 직무수행을 방해하는 알선․청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련 된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.
	5.	회사 임․직원이 관계공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 어떠한 불이익 처분도 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.
		위 청렴이행 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 계약상대자 또는 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 수의계약 결격 대상자 지정, 계약해지 등 부산광역시 사하구의 조치와 관련하여 당사가 부산광역시 사하구를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.
202 년 월 일
서약자 주 소 : 업체명 : 대표자 : (서명 또는 인)
부산광역시 사하구청장 귀하