설계용역 과업지시서 - 영일초등학교 공간재구조화사업(증축) -

2025. 7.

목    차

Ⅰ. 설계 개요	2

Ⅱ. 일반사항	5

Ⅲ. 공통 설계 지침	10

Ⅳ. 계획설계 지침	15

Ⅴ. 중간설계 지침	17

Ⅵ. 실시설계 지침	19

Ⅶ. 건축공사 설계지침	21

Ⅷ. 설계도서 작성 및 납품	34

【붙임 1】 실별 소요면적(SPACE PROGRAM)	40

【붙임 2】 대지현황	42

【붙임 3】 주간 공정보고	44

【붙임 4】 월간 공정보고	45

Ⅰ

설 계 개 요

1. 용역명: 영일초등학교 공간재구조화사업(증축) 설계용역

2. 목적

40년이상 경과된 노후시설을 다양한 교수학습을 반영하기에 부족한 공간을 가진

영일초등학교 부지에 교사동을 공간 재구조화한 후 기존 본관동과 후관동 2개동 철거해체하여 실내외 환경을 개선하여 단순하고 획일적인 학교공간에서 탈피하여 미래지향적이며 안전하고 쾌적한 미래 교육환경을 조성하고자 한다

3. 사업개요

가. 대지 위치: 경상북도 영주시 영주로147번길 17

나. 대지 면적: 15,895.8㎡

다. 사업 규모

1) 추정 연면적: 4,800㎡(±5%이내 조정 가능), 지상 3개층 규모

2) 주용도: 초등학교(교육연구시설)

3) 사업 규모: 초등학교 [16학급(유치원 2학급 포함)]

라. 총 공사비(건축/토목/조경): 금8,600,000천원(부가세 포함)

※ 사업 규모 및 예산액 범위 내 설계하는 것을 원칙으로 하되, 설계 면적은 ±5% 범위 내에서 조정할 수 있다.

4 과업 범위

가. 본 용역 계약 상대자는 계획설계, 중간설계 및 실시설계를 수행하여야 하며, 설계범위는 건축, 토목, 조경공사 분야를 포함한다.

나. 본 공사 준공 이후 건축행정 시스템(세움터)상 건축물 관리대장 등재 업무를 수행하여야 한다.

다. 안전 관리 계획(높이 5M 이상인 거푸집 및 내부 동바리, 천공기, 항타기 등) 수립이 예정되는 공사로 설계의 안전성 검토를 적용한 설계를 하여야 한다.

라. 경상북도영주교육지원청(이하“우리 청”이라 한다)의 계획설계 설명회, 중간설계 심의협의회 및 사용자 측(지역민 포함) 설계 설명회 등 모든 협의회의 관련서류 작성과 브리핑을 수행하고, 심의(협의)된 결과를 정리하여 본 설계에 적극 반영하여야 한다.

마. 적절한 설계와 효과적 사용을 통해 범죄유발 요인을 근본적으로 제거하는 셉테드(CPTED) 기법을 설계에 반영하여야 한다.

바. 건축 인허가, 설계 협의회, 학교환경 디자인팀 자문, 공사발주를 위한 관련 자료제출 등에 적극 협조하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 우리 청의 요구사항을 반영하여야 한다.

사. 우리 청에서 추진하는 감성적인 학교 공간 조성계획에 따른 관련 내용이 잘 반영될 수 있도록 협조하고 아이디어를 제공하여야 한다.

아. 추가 과업에 따라 진행하는 각종 인증(녹색 건축, 제로에너지건축물, 장애물 없는 생활환경 인증, 건축물 해체계획서 작성, 설계의 안전성 검토 등) 수수료 등 영주교육지원청(이하 “발주청”이라 한다)에서 별도 지급한다.

5. 용역 기간

본 설계용역 기간은 착수일로부터 240일 이내로 한다.

(계획설계 30일, 중간설계 60일, 실시설계 120일, 설계 협의 및 심의 30일)

☞ 본 설계용역 기간 중 설계 협의 및 심의에 소요되는 30일에는 각종 설계 협의회(설명회), 중간 설계 심의 및 학교환경디자인팀 자문 기일 등을 포함한다.

6. 설계 방향

가. 본 사업은 교육기반을 조성하고 변화하는 교육에 대비할 수 있는 학교시설로 계획한다.

나. 본 사업은 지역사회의 문화적 중심체로서의 역할을 분담할 수 있는 효율적이고 합리적인 기능의 배치와 창의력 넘치는 건물을 조성한다.

다. 초등학교로서 실용적이어야 하며, 상징성과 창의성이 표현되어야 한다.

라. 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능성이 있어야 하며, 이에 대한 각종 자료와 그 근거를 제시할 수 있어야 한다.

마. 대상지의 자연적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지(증축계획 고려)하여야 하며, 대상지의 지형, 지세 등의 약점을 보완할 수 있고, 가용공간을 효과적으로 확보할 수 있는 설계 방안을 제시한다.

바. 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 녹지 등에 관한 법률, 설비기준령 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획한다.

사. 녹색건축 인증(일반), 제로에너지건축물 인증(4등급), 장애물 없는 생활환경 인증(BF인증)을 적용하여 설계

아. 범죄예방 환경설계(CPTED) [국토부 고시 제2015-198호“범죄예방 건축기준 고시”준용

※ 계획 시 미리 관할 경찰서 범죄예방 진단팀(CPO:Crime Prevention Office)의 범죄 예방환경시설(CCTV-비상벨) 설치 위치 등 자문 실시한다

자. 지역의 문화교류 및 발전에 이바지하고 모범적인 공공건축물로 조성

카. 지구 환경문제와 새집 증후군 등에 능동적으로 대처하고 예방할 수 있는 환경 친화적인 시설로 설계하여야 한다.(건축물의 장수명화, 친환경 자재, 신·재생에너지, 고효율 기자재 사용, 생태 면적률 적용 등)

타. 모든 사람들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 시설로 설계하여야 한다.(엘리베이터, 옥외 경사로, 난간, 장애인편의시설 및 기타 관계법령에 따라 설계반영)

파. 지진 및 각종 풍수해에 대비하여 관계 법령에 적합하게 설계하여야 한다.

Ⅱ

일 반 사 항

1. 일반 사항

가. 본 용역은 국토교통부 고시 제2020-635(2020.09.14)호의「공공발주사업에 대한 건축사의 업무 범위와 대가기준」에 의한 [별표 2] 건축설계에서의 도서작성 기준에 의거 추진 단계별(계획·중간·실시설계) 중급 이상의 설계 도서를 작성하여야 한다.

나. 본 설계는 국토교통부 제정 각종 공사시방서, 건설공사 표준품셈과 본 설계지침에 의거 작성하여야 한다.

다. 모든 자재는 KS 제품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없는 자재는 국산 최우량품 또는 녹색제품을 사용하여야 한다.

라. 용역 수행 내용

1) 계획 설계도서 작성 및 브리핑(각종 협의회 포함)

2) 중간 설계도서 작성 및 브리핑(각종 협의회 포함)

3) 실시 설계도서 작성

4) 조감도 작성

5) 주요자재 선정 검토서 작성

6) 색채 계획서 작성 및 포함 사항

가) 색채디자인 기본방향 및 개념

나) 외부 입면 색채계획

다) 평면 색채 계획

라) 공용 공간(홀, 복도 등 색채계획)

마) 각 실별 색채계획

바) 색상 명시 등

7) 미세먼지 저감 대책

8) 설계 설명서에 포함될 사항

가) 설계 주안점(테마, 스토리, 지역 및 학교 특성 등)

나) 설계 진행과정 일체

다) 조감도, 설계 개요, 대지 현황, 우수시설 사례조사, 법규 검토서

라) 건축계획, 구조계획

마) 기계설비계획, 전기·통신계획, 소방계획 등

바) 그 외 발주기관에서 요청하는 사항

9) 설계 설명서는 설계도서와 일치하여야 한다.

10) 기타 계약서 또는 과업지침서에 정하는 사항

2. 행정 사항

가. 착수계 제출 시 다음의 제반 서류를 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 사업 책임기술자 선임계

- 재직증명서, 이력서, 기술자 면허수첩 사본, 경력증명서 첨부

3) 설계 예정공정표

- 분야별 세부공정 계획서 및 업무흐름도 포함

4) 분야별 참여기술자 명단

- 재직증명서, 이력서, 기술자면허수첩 사본, 경력증명서 첨부

5) 보안각서

6) 과업 수행 계획서

- 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

- 분야별(건축, 구조, 색채 등) 업무범위와 책임한계

- 설계품질 보증계획

- 각 분야별 인력투입계획

- 분야별 세부 과업수행 절차

- 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

나. 업무협의 및 공정 보고

1) 계약 상대자는 착수계 제출 후 우리 청과 협의하여 정기적인 업무협의회(월 2회 이상)를 실시하며, 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 하여야 한다.

가) 조사 및 자료 수집의 완료 또는 공법 결정 시

나) 계획설계 및 중간설계 완료 전

다) 실시설계 완료 전(유지관리 계획을 포함)

라) 각종 협의 및 설계심의 자료 작성 완료 시

2) 계약 상대자는 매주 공정보고 및 매월 공정보고를 우리 청 담당자에게 제출하여야 한다.

가) 주간 공정보고【붙임 3】: 매주 수요일

나) 월간 공정보고【붙임 4】: 매월 마지막 주 수요일

☞ 제출방법: 우리 청 담당자 이메일로 제출

3) 설계 설명·협의회의 내용 반영 등 주요한 업무는 사전 승인을 받도록 하며, 과업수행은 예정공정표에 따라 성실히 수행하여야 한다.

다. 관련기관 인·허가 및 협조

1) 계약 상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축허가에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

2) 계약 상대자는 과업부지 내·외 지하지장물의 매설여부(상·하수도관, 기타)를 계약 상대자 책임 하에 조사하고, 관련기관과 협의한 후 설계에 반영하되, 협의 결과를 우리 청에 보고하여야 한다.

3) 계약 상대자는 본 과업의 인·허가 사항에 대하여 우리 청과 협의하여 가능한 용역기한 내에 건축승인 등 모든 행정절차를 완료할 수 있도록 노력하여야 한다.

라. 하도급의 범위

1) 계약 상대자는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 시험, 지반조사, 측량 등 이와 유사한 작업

나) 계획설계 연구와 관련된 업무

다) 적산 및 견적업무, 구조계산 설계업무

라) 기타 발주청이 인정하는 업무

3) 하도급은 관계법령에 의거 적격자에게 하도급 하여야 하며, 「건설기술진흥법」

제35조제4항 및 같은 법 시행규칙 제31조의 1항에 의거 설계용역의 하도급을

체결하였을 경우 하도급 기술참여자 명부를 작성하여 즉시 우리 청에 통보하여

야 한다. 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 져야한다.

마. 타 계약상대자와의 업무한계

다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 기간 내의 과업을 수행하여 서로간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 대표자 책임 하 에 계약상대자간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

바. 과업의 변경 등

본 과업수행 중 우리 청의 사업계획 변경 등에 따라 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정·변경할 수 있다.

3. 유의 사항

가. 계약상대자는 우리 청에서 제시하는 기본사항(제원, 위치, 계획, 개요 등)과 설계 유의사항을 충분히 숙지한 후 관련 자료를 수집하여 본 과업의 성과가 설계에 집약될 수 있도록 하여야 한다.

나. 계약상대자는 각 분야별 설계에 있어서 특수성 및 중요성이 요구되는 것은 그 원인을 분석하여 담당자와 협의 후 경제적이고 합리적인 안을 채택하여 설계하여야 한다.

다. 계약 상대자는 계약서에 의거 기한 내 착수계 등 제반 서류를 제출하고 진행사항을 수시로 담당자에게 통보하여야 한다.

라. 계약 상대자는 설계를 수행함에 있어 완료되거나 수정 설계 시에는 기계, 전기 용역 계약상대자 등과 수시로 협의하여야 한다.

마. 설계심의 및 보완 등

1) 계약상대자는 각종 설계와 관련된 설계심의회 및 설명회(협의회)에 참석하여 설명은 물론 심의자료를 작성하고, 보완요구 사항이 있는 경우는 즉시 보완조치 하여야 한다.

2) 제출된 설계도서는 우리 청이 관계 기관과의 협의를 거쳐 확정될 때까지의 지적사항과 공사시행 과정에서 설계변경(설계서의 내용이 공사현장과 상이, 누락·오류 또는 상호 모순 등) 상황이 발생되는 경우와 우리 청의 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 즉시 수정·보완하여야 한다.

바. 설계도서의 저작권

본 설계 건에 대하여는 계약상대자의 설계도서 납품 후 우리 청의 시설사업 추진이 목적이므로, 용역 납품 후 설계도서의 저작권은 우리 청에 귀속되며, 저작권과 관련한 제반사항은 저작권 법령에 따른다

사. 책임 및 하자보증

1) 계약상대자는 일체의 제출도서에 대하여 책임을 져야 하고, 시공 도중 설계도서가 상호 부합되지 않을 경우 현지조사 및 시험 등의 요구가 있을 시 즉시 응하여야 하며, 이에 따른 발생 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

2) 용역납품 검수 후라도 설계상의 결함 또는 변경 사항은 반드시 수정요구에 응하여 보완 제출하여야 한다.

3) 제출된 설계도서에 대한 하자(공사시공 및 준공 후 설계구조의 불안전으로 발생하는 하자와 설계 후 공사물량의 착오로 인하여 손해가 있을 시 등)는 계약상대자로서의 성실의무와 필요한 조치를 이행하지 않으므로 인해 발생되는 상황이므로 이에 대한 모든 민·형사상의 책임을 져야한다.

아. 계약의 해제

용역계약 체결 후 과업진행 중 다음 경우에는 우리 청이 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며, 계약상대자는 이의를 제기할 수 없다.

1) 계약서상의 설계도서 작성 지침 및 계약 후 우리 청의 정당한 지시사항을 고의 또는 임의로 불이행 했을 경우

2) 계약상대자 개인의 특수사정, 무성의, 불성실 등으로 지정기일 내에 도저히 납품 가능성이 없다고 예상될 경우

3) 계약상대자의 고의 또는 부주의로 외부에 과업내용을 공개하여 우리 청의 사업 추진상의 물의를 야기 시켰을 경우

자. 우리 청의 사정으로 건축 승인이 지연될 경우 별도 협의에 의하여 추후 건축승인을 완료하여야 한다.

Ⅲ

공 통 설 계 지 침

1. 일반 사항

가. 부지 내의 모든 시설에 관한 계획은 종합계획을 수립 한 후 이에 따라 세부 실시계획이 작성되어야 한다.

나. 각 시설의 설계는 안전성, 경제성, 시공의 난이도 및 기능에서의 합리성이 검토되어야 하며, 가능한 조형미의 구현을 위한 노력이 집중되어야 한다.

다. 공사 집행계획에 소요되는 자재, 장비 및 노무 수급 등의 계획이 동시에 검토  되어야 하며, 합리적이고 구체적인 계획이 되도록 하여야 한다.

라. 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 합치되어야 하고 해석이 용이하도록 작성하여야 한다.(설계도서, 공사시방서, 각종 계산서 등)

마. 예정공정표는 PERT 또는 CPM 기법으로 작성하고, A3규격으로 제출하여야 한다.

2. 사전조사에 관한 사항

가. 정확한 기반 조사

1) 부지입지 조건 및 지형조사

2) 지질·지반조사

나. 기상조건 조사

1) 일조 및 기온·습도

2) 풍향 및 풍속

3) 강우 및 강설량

다. 교통관계

1) 도로 및 교통량

2) 주차장

3) 중량적 운반수단 검토

라. 지하매설물 및 배수 계통의 조사

1) 지하 매설물 유무 조사

2) 배수 및 오물처리 계통(해당 지역의 상·하수 시설 기본계획 포함)

마. 지역조건에 관한 조사

1) 지역의 위치, 형태 및 범위

2) 인근 시설물

3) 대지 내 기존 시설(장애물)의 유무

4) 토지이용계획에 관한 사항(도시계획상 용도지역 관계)

3. 건축물의 조형미 구현에 관한 사항

가. 건축물은 기능을 우선적으로 고려하되 미적으로 양호하여야 하며, 품질 확보를 위한 견실 설계로 부실공사를 예방할 수 있도록 최선의 노력이 집중되어야 한다.

나. 입면계획의 조형미

1) 균형과 통일성

2) 변화 있는 계획

다. 특수성을 살린 건축 계획

1) 기능에 따른 특징

2) 상징적 표현(Land Mark)

라. 마감 재료의 적정한 선택

1) 색채의 조화

2) 질감의 적정

3) 내구성이 있는 재료 선택

마. 주변 환경 여건과의 조화

1) 건축 계획의 조화성

2) 조경 계획의 적정화

4. 건물 계획에 관한 사항

가. 사용에 적정한 규모의 실 규격(모듈) 판단

1) 수용인원 판단

2) 수용장비의 크기, 용량, 대수판단

나. 사용 편리를 위한 건물 각부 치수결정(인체 및 사용기기, 설비 치수에 부합)

1) 출입구 크기의 적정화

2) 천장높이 및 창문높이 검토

3) 부대시설 크기 및 설치위치 검토(부속실, 기자재, 국기게양대 등)

4) 각부 치수의 표준화, 자재의 규격화

다. 이용에 합리적인 시설배치(각 실, 기자재 등)

1) 가급적 동선의 단축

2) 사용자가 편리한 동선 계획

3) 요구 기능에 따른 동선의 분리

4) 상·하층을 연결하는 수직 동선의 검토

라. 사용자가 편리하게 이용할 수 있는 후생시설 확보

1) 실내·외 휴게 공간 배려

2) 부지 주변의 휴게 공간 연계

마. 건물용도 및 규모에 적정한 내․외장 재료의 선택

1) 재료의 내구성(강도 등) 검토

2) 재료의 색상, 질감 및 사양 검토

3) 재료의 경제성 검토

바. 비상 시 대피시설의 확보

1) 피난시설(피난계단, 통로, 지하실, 비상구 및 옥외 공간)

2) 방화상 필요한 구조 및 재료의 선택

3) 오물 방지시설 계획 검토

사. 건물외관 계획에 관한 사항 검토

1) 건물 기능에 적합한 외관의 선택

2) 주변 환경과 조화되는 계획

3) 가급적 조형미의 구현

아. 사용에 적합한 통로시설 확보

1) 계단(계단의 위치, 폭, 단 너비 및 높이)

2) 복도 및 통로(복도 폭과 보행거리 검토)

자. 에너지 절약을 위한 건축 계획

1) 단열효과의 제고를 위하여 외벽, 바닥 및 천장의 구조 및 재료 검토

2) 가능한 자연채광과 환기를 고려한 적정면적의 창문설치

차. 창호설치 계획의 적정화

1) 실 기능에 맞는 창호재의 결정

2) 채광 및 환기를 위한 개구부 면적의 확보

3) 창호의 개폐방식, 방향, 크기의 적정화

4) 적정한 종류 및 크기, 창호 부속철물의 설치

5) 창호용 재료의 규격품 사용 명시

6) 창호의 개폐 시 밀폐될 수 있도록 정밀 설계

7) 창호의 재질은 단열, 결로 등을 방지 할 수 있는 기능성 창호로 설계한다.

5. 누수 및 결로 방지 대책에 관한 사항

가. 지하 수압 적용에 관한 사항

1) 지하수 및 수압 검토

2) 방수재료 및 공법의 적정성 검토

3) 지하수위를 낮추는 방안

4) 방수층을 통과하는 각종 배관주위 방수대책 강구

나. 우수 및 침수에 따른 대책

1) 지붕 및 외벽 부분에 대한 우수, 침수 대책검토(방수재료 및 공법선택)

2) 개구부 주위 누수방지 대책

3) 돌출부분 등 물끊기 처리

4) 화장실, 욕실 등 물 사용 실에 대한 방수대책

다. 결로 방지를 위한 검토

1) 외벽의 실내에 면한 부분의 구조 검토(노점온도 이상이 되도록 처리)

2) 열교현상 방지대책

6. 건축구조의 안전성에 관한 사항

가. 지반 상황에 적합한 기초구조 선택

1) 적정한 지내력의 판단

2) 기초의 구조 및 시공방법 결정

3) Pile의 종류, 규격, 품질, 소요수량 검토

나. 구조물에 작용하는 하중의 적정한 판정

1) 고정 하중

2) 활하중

3) 풍압 및 적설하중

4) 수압, 토압, 기타

5) 내진설계(학교시설 내진 설계기준고시)

다. 구조내력 상 필요한 내력벽의 설치 검토

1) 내력 상 필요한 벽량의 확보

2) 내력벽의 두께 및 길이

3) 내력벽의 구조 검토

라. 경제적이고 시공이 용이한 구조의 선택

1) 구조상 불필요한 부분의 제거 및 과대한 부재 단면의 축소 검토

2) 시공 및 구법이 용이한 구조 계획

3) 구조의 안전에 필요한 부재의 최소 단면 결정

마. 구조물 신축에 대비한 신축줄눈 설치

1) 구조 연장이 긴 경우와 이질재간의 접합부, 기타 필요한 경우 줄눈 설치

2) 설치 위치에 적합한 줄눈 종류 결정

7. 설계도면 작성에 관한 사항

가. 각종 표기, 기호 및 방법은 관계 기준에 맞게 표기

나. 시공 및 적산이 가능토록 각종 상세도 작성

1) 각종 치수의 정확한 명기

2) 각종 사용자재의 명칭 기입

3) 각종 자재의 규격, 품질, 형태의 표시

4) 각종 설비계통의 명확한 표시

5) 조경자재의 수종, 규격, 위치 등을 정확히 표시

다. 설계도서 상 설계 책임자의 서명 또는 날인

8. 시방서 작성에 관한 사항

가. 시방서는 일반시방서와 특기시방서를 구분 작성한다.

나. 특기시방서는 일반시방서에 명시되지 않은 다음 사항을 포함 작성하여야 한다.

1) 재료의 규격, 품질, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항

2) 각종 자재의 설치방법(가공, 조립, 부착 등)에 관한 사항

3) 각종 가설물(가설, 건물, 울타리, 흙막이공법 등)에 관한 사항

4) 각종 구조공법(말뚝박기, 배근, 용접 등)에 관한 사항

5) 재료의 배합과 양생에 관한 사항

다. 공사시방서 내용은 본 공사에 해당되는 부분만 작성하여야 한다.

9. 현장 인계에 관한 사항

설계도서를 납품한 후 우리 청 담당자에게 도근점, T.B.M 등을 인계하여야 한다.

Ⅳ

계 획 설 계 지 침

1. 계획 설계 도서 작성

가. 설계 방향

1) 우리 청에서 제시하는 과업 내용과 각종자료를 분석하고 제반요소에 적합한 설계안을 제시하여 추후 중간 및 실시설계 용역을 수행할 시 기본이 되도록 하여야 한다.

2) 계획설계 진행과정을 우리 청과 수시로 협의하여야 한다.

3) 계획설계를 수행함에 있어서 건축법 및 기타 제반법규와 설계기준 및 과업지침서에 합당하여야 한다.

4) 계획설계 과정에 있어서 본 지침 및 일반 사항에 의하여 작성하되 미비 또는 의문사항이 있을 시 우리 청과 협의하여야 한다.

나. 관련법규 검토

- 건축구조기준, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

- 장애인·노인·임산부 등의 편의 증진에 관한 법률

- 공중화장실 등에 관한 법률

- 건축법

- 건설산업기본법

- 건설기술진흥법

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

- 도로법

- 하천법

- 폐기물관리법

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

- 주차장법

- 환경보건법

- 학교보건법

- 학교시설사업촉진법

- 학교 안전사고 예방 및 보상에 관한 법률

- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

다. 부지 현황 조사

1) 현부지를 포함한 주변부지의 자연환경조사

가) 지형, 지세

나) 토질, 지반

다) 식생, 수리, 홍수

라) 조망, 시야의 조사

2) 인문 환경조사

가) 지역사회의 요구, 사용규범, 행위·활동의 조사

나) 사회계층의 조사, 사회의 욕구조사

다) 조각, 회화, 음악적 특유성의 조사

라) 정치·경제적 시대성 조사 및 시대의 유행조사

3) 기반 시설의 조사

가) 도로 및 차량 동선의 조사

나) 보행자 도로 및 보행 동선의 조사

다) 파출소, 병원, 우체국 등 도시의 사회적 기반시설 조사

라) 상·하수, 오·폐수 등  도시의 기술적 기반시설의 조사

마) 금회 시설 등 사용할 수 있는 주변 시설의 조사

라. 설계기준 및 여건 분석

1) 주변환경 분석

- 대상지역의 위치 및 세력권 분석

- 대상지역의 지형, 소음, 전망 등을 분석

- 동선의 분석

2) 체험시설의 운영에 따른 관리 체험부분 분리

- 체험시설 운영 프로그램 분석

3) 체험동선 분석

- 체험동선과 관리동선을 분리

- 보도 차도 공간분리

- 안전한 승하차를 위한 (Drop-Off Zone) 동선계획

2. 계획 설계도서 납품

가. 계획설계 연구보고서 5부.

나. 계획 설계도서 일체 5부.

다. 계획설계 설명회 자료 각 20부.

라. 가~다”까지 내용이 포함된 USB 1매.

☞ 위 “가~다”까지의 제출물은 사정에 따라 달라질 수 있음

Ⅴ

중 간 설 계 지 침

1. 중간 설계도서 작성

가. 설계 방향

1) 계약상대자는 승인된 계획 설계안에 따라 다음과 같이 중간설계를 수행하여야 한다.

2) 계약 상대자는 우리 청이 승인하기 위하여 요구하는 합리적인 중간 설계안을 준비하여 제출(지역·지구에 따른 건축 법규 분석과 추정 공사비 산출 포함)하여야 한다.

3) 외벽, 지붕, 구조, 실의 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야 한다.

4) 설계 요구 조건을 만족하여야 한다.

나. 과업 내용

1) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 파악

나) 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

다) 관련시설의 사전 조사와 수요자 요구사항 조사 및 협의

라) 유사 사례 및 관계 법령 조사

마) 각종 설계 협의

바) 관련 기관과의 협의

2) 조건 설정

가) 설계 조건의 설정

- 요구 성능 확인

- 법령 및 기타 제약 조건의 정리

- 안전 성능의 설정

- 공사 예산의 파악

나) 설계 방침의 설정

- 설계 개념의 확립

- 개략 공사시방서의 설정

- 사용 재료 및 기기 등의 설정

다) 비교 및 검토

- 성능 면에서의 기능 검토

- 설계 이념·의장 및 구조 형식 등의 검토

- 공사비 및 시공성 검토, 사용기기, 재료 등 검토

- 유지관리상의 검토

- 시방, 구조 방식 등의 종합적 검토

- 지하 매설물 이설 및 보강공법 비교 검토

라) 종합화

- 기능 배치 계획의 선정

- 공간 구성 계획의 선정

- 공사비 배분 계획의 선정

- 동선 계획의 선정

- 방재 계획의 선정

- 시설 배치 계획의 선정

- 평면, 입면, 단면 계획의 선정

- 구조 계획의 선정

- 내·외 환경 계획의 선정

- 조경 계획의 선정

- 수요자의 요구사항 종합 및 선정

- 토사운용 계획, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계측 포함), 포장계획, 상·하수도 계획

2. 중간 설계도서 납품

가. 중간 설계도서 일체 5부.

나. 중간설계 심의회 자료 각 20부.

다. 색채계획서 자료 각 8부.

라. 중간설계 설명회 자료 각 5부.

마. 가~라”까지 내용이 포함된 USB 1매.

☞ 위 “가~라”까지의 제출물은 사정에 따라 달라질 수 있음

Ⅵ

실 시 설 계 지 침

1. 실시 설계도서 작성

가. 설계 방향

1) 계약 상대자는 승인된 중간설계안을 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 실시설계를 수행하여야 한다.

2) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용·인력·장비 등 유지관리방법을 제시하여야 한다.

3) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토·반영되도록 하여야 한다.

4) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍·혹서·혹한 등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 산정하여야 한다.

5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 공사시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 우리 청이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

나. 과업 내용

1) 실시 설계 전후 건설기술진흥법에 따른“설계의 안전성 검토”에 따른 자료 제공 및 검토사항을 반영한다

2) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 상세한 파악 및 현지 상세조사 및 확인

나) 관련시설 상세조사와 수요자의 요구사항 확인

다) 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

라) 특수 공법 부분의 상세 조사

마) 각종 법령 수속에 대한 협의

3) 조건 설정

가) 중간설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

- 각 부분의 요구 성능의 확인

- 법령, 기타 제약 조건 파악

- 각종 하중 조건 및 해석 방법 설정

- 각 설비의 요구 성능의 확인

나) 공사비의 파악 및 기자재 배치 결정

4) 비교·검토

가) 각 부분 기능의 검토

나) 공간 표현의 검토(형태의 검토 및 사용 재료의 검토)

다) 공사비 및 시공기술의 검토

라) 각종 설비 방식의 검토 및 유지관리에 관한 검토

마) 사용기기 및 사용 재료의 검토

바) 관계법령 등의 조합 및 검토

5) 종합화

가) 외부 및 내부 공간 설계

나) 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

다) 평면, 단면, 입면 및 상세설계

라) 공사비 예산과의 조정

마) 방재 설계, 응력 해석 및 구조 설계

바) 색채 계획의 수립

사) 신·재생에너지 이용설비 계획의 검토 조정

아) 사용 재료, 사용기기 및 사양 결정

자) 수요자의 요구사항 결정

차) 각종 설계 등의 조정

다. 재료선정 기준

각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상·질감·무늬 등이 적합한 재료를 선택하되 다음사항에 유의하여야 한다.

1) 경제성을 고려할 것

2) 색채의 조화 및 통일성을 기할 것

3) 내구성 있는 재료를 선택할 것

4) 유지보수가 용이한 재료를 선택할 것

라. 각부 재료

1) 외벽재료

외부색채와 질감 및 미관을 고려하여 재료를 선정하여야 한다.

2) 내부바닥

경제성, 소음 발생, 위생관리, 유지관리상 적정한 제품으로 선정하여야 한다.

3) 내벽재료

각 실의 용도 및 특성을 고려하여 경제성 있는 재료를 선정하여야 한다.

4) 천정재료

실의 기능에 따라 흡음성을 고려하여 선정하여야 한다.

5) 창호재료

에너지효율등급 성능을 만족하는 자재로 검토하되 경제성, 단열성 등을 고려

6) 방수 및 단열재료

내구성, 시공성, 경제성 등을 고려하여 선정하여야 한다.

2. 실시 설계도서 납품

Ⅺ. 설계도서 작성 및 납품(2-다. 최종성과품 종류 및 납품수량) 참조

Ⅶ

건축공사 설계지침

1. 일반사항

1) 공모의 목적, 응모요령을 준수하고 사업개요 등을 참고하여 계획하도록 하며, 학교단위 공간혁신 사업임으로 사용자 참여 설계를 진행하여 학교관계자, 학부모, 학생 등 사용자와 충분한 협의를 통한 계획, 중간, 실시설계를 하여야 한다.

2) 대지의 지형적 특성을 고려하여 기존 건축물들과 연계 될 수 있도록 계획한다.

3) 교육과정 등 원활한 교육활동 제공을 위해 학생들의 이동과 접근성에 혼잡이 없도록 계획한다.(대지 주변의 보차도 분리 및 출입구 보행 환경개선 등)

4) 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용)을 지양하고 학생중심의 평면과 공간을 내실있게 계획한다.

5) 입지현황을 고려하여 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 설계한다.

6) 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 설비기준령 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획한다.

7) 환경부․국토교통부 운영「녹색건축물 인증제도」에 의한 녹색건축물 인증제도 학교건축물 예비인증 및 본인증을 취득할 수 있도록 계획한다. [녹색건축물 인증제도 심사 기준(학교시설 부문)]

8) 특수학급은 가급적 저층부에 계획하고, (장애인) 수용에 대비하여 엘리베이터를 통한 수직동선 계획한다.

9) 옥외공간은 생태 환경을 이해할 수 있는 자연적 공간으로 구성하여 감수성 증대와 학생 상호간의 사회성 증진을 위한 공간으로 계획한다

10) 복도 등 공용공간은 단순한 기능 공간이 아니라 또 다른 교육적 소통장소로서 인식될 수 있도록 계획한다.

11) 획일적 공용공간을 지양하고 오픈스페이스, 채광 등을 이용하여 공간적으로 쾌적하고 건강한 장소가 될 수 있도록 계획한다.

12) CPTED(범죄예방환경설계)를 적용하되 학교시설 구성요소와 연계하여 계획단계에서 충분한 검토가 이루어지도록 한다.

13)  공사 시 임시교사를 사용할 경우 임시교사의 적정 위치를 제안하고 공사 중 안전성과 쾌적성을 확보할 수 있도록 배치한다.

14) 제안된 스페이스프로그램의 모듈을 적용하되 단위공간의 형태는 자유롭게 제안할 수 있으며, 총 연면적은 기준을 초과하지 않도록 하되 공용공간은 스페이스프로그램에 제시된 전체 연면적의 40%의 이하가 되지 않도록 계획한다.

2. 설계 기본방향 및 주안점

가. 배치 계획의 설계 주안점

1) 가능한 모든 교사동은 일조, 조망, 음영, 소음 등의 환경적 요인에 피해가 되지 않도록 적절한 배치를 고려해야 하며, 특히 영주 영일초등학교가 도로와 면하고 주거지와 인접한 점을 고려하여 학교로의 소음의 영향이 최소화되는 동시에 주거지로의 소음의 영향이 최소화되는 배치가 되도록 계획할 수 있다.

2) 존치되는 강당과 금회 증축되는 교사동과의 연계성 또는 활용성 등이 적절하게 고려될 수 있도록 계획한다.

3) 동측의 주출입구는 학생들의 안전을 고려하여 보행자 전용 출입구로 계획 또는 차량 출입구과 보행자 출입구을 구분하여 계획할 수 있다.

차량 동선과 보행자 동선 사이의 버퍼공간은 출입구 쪽의 시야 확보와 출입자 감시 등을 위해 낮은 키의 수목을 활용한 조경공간으로 계획할 수도 있다.

학생들의 안전한 등하교를 위해 동측 주출입구 인근에 차량의 Drop-off & Pick-up 구역 설정을 고려한다.

4)  비상 시 대피 동선, 서비스 및 하역 동선, 소방진입용 동선이 적정하게 확보하여 계획한다.

5) 충분한 기초 조사(지질, 주변여건 등) 및 이용자 요구파악을 통해 교지가 효율적으로 활용될 수 있도록 진출입 및 건물의 축·향 ․ 경사, 일조·통풍·배수·소음 등을 고려하여 계획한다.

6) 부지여건, 주변지역의 접근체계, 기존도로 및 계획도로 등을 최대한 수용하여 자연생태환경 및 경관의 훼손을 최소화 할 수 있도록 계획한다.

7) 일조 등 경제성을 고려하여 적정 밀도의 건물동을 배치하며, 교통량 및 교통안전을 고려하여 진출입 동선을 계획한다.

8) 옥외 공간 및 시설물이 교육적 기대에 부응할 수 있도록 계획하며 다수의 이용에 있어 접근성, 안전성 확보되고 공공시설물로서 다양한 활동이 가능하도록 계획한다.

9) 주차장은 법정주차대수를 확보하며, 보행동선과 간섭되지 않도록 옥내․외 주차장을 계획하고 확장성을 고려한다.

10) 공사비절감 및 학생들의 수업권보장을 위해 공사중 기존교사동을 최대한 활용하고 신축교사동을 운동장에 배치하는 등의 교사동 배치계획도 고려할 수 있다.

나. 평면계획의 설계 주안점

1) 제안된 스페이스프로그램의 기준으로 제시된 모든 공간들이 누락되지 않고 반영되도록 평면계획을 수립한다.

다만 교수학습의 다양성과 효과를 높이기 위해 일부 공간의 통합 및 실수 조정 등은 가능할 수 있으나, 공용면적의 비율은 스페이스프로그램에 제시된 면적비율을 반드시 준수하여야 한다.

2) 실은 획일적인 형태를 지양하고 규모, 구조, 형태 등 교과별 필요한 다양한 공간을 확보할 수 있도록 계획할 수 있다.

3) 도서관은 조용한, 정숙한, 전통적인 도서관의 형태를 탈피하여 개방적으로 구성하고 서가공간, 책상이 있는 공간, 좌식 공간 등 다양한 공간의 기능을 융합한다.

4) 도서관은 외부개방을 고려하여 학습공간과 분리 가능하도록 계획하되, 이용자의 동선 분리로 안전에 유의하여 계획한다.

5) 도서관은 1~2층 복층구조로 계획하여 공간에 개방감을 부여하고 자연채광과 열린조망과 외부로 개방하여 야외 휴게공간과의 연결

6) 공용공간은 단순한 복도공간이 아닌 다양한 커뮤니티 공간으로써의 역할이 가능하도록 계획

7) 개방감있고 학생들의 활동 및 작품을 전시할 공간 조성

8) 모임공간/오픈공간 등을 활용하여 다양한 활동이 가능한 공간으로 계획

9) 유치원 시설은 교수학습형태의 놀이/체험 등을 고려하고 실내/외를 유기적으로 연결할 수 있게 외부공간과 연계 배치를 고려

10) 일반교실은 저학년과 고학년과 동선을 최대한 분리할 것

11) 특별교실은 기능과 설비를 공유하는 실들을 근접 배치하고 유연하게 계획하며 준비실 등 고려

12) 각 실은 가변적 활용을 염두하고 벽체 계획을 하되, 방음과 적절한 시선 차단 고려

13) 다목적교실 등은 여러가지 목적의 행위를 수용할 수 있도록 수납과 책/걸상의 배치를 고려

14) 정보화 기자재를 활용한 교수학습 대응을 위해 첨단교실(스마트교실)을 계획하되, 노트북, 컴퓨터, 테블릿PC 등 다양한 스마트기기가 구비되어야 하며 이를 보관/관리 할 수 있는 공간이 확보되어야 한다.

모둠수업, 협력수업, 프로젝트 수업 등에서 활용가능하며, 모든 교과에서 활용할 수 있도록 지원시설 존에 함께 배치한다.

첨단교실은 강의형, 모둠형 등 수업 형태에 따라 쉽게 책상 배열 변경이 가능하도록 이동식 책걸상을 권장한다.

15) 휴게공간은 공용공간과 연계하여 학생 및 교사가 자유롭게 활용할 수 있는 개방적인 휴게공간으로 계획한다.

16) 실내휴게공간은 교사동 중심에 배치하여 모두 활용 가능한 휴게공간과 복도 및 공용공간 곳곳에 소규모로 조성된 휴게공간 등 다양한 규모와 다양한 형태로 계획한다.

17) 실외의 휴게공간은 내부 공간과 연계하여 자유롭게 출입이 가능하도록 계획할 수 있다.

18) 다양한 동아리 활동과 특별활동을 할 수 있는 별도의 교과교실, 다목적교실 등을 확보한다.

19) 음악실 내 무대는 별도로 설치하기 보다는 공간 전체가 무대공간이 되도록 조성하고 관람석은 이동식 또는 수납식 스탠드를 활용고려, 사용하지 않을 시 수납, 보관할 수 있도록 함으로써 공간의 효율적 이용을 도모한다.

20) 필요시 일부 교실에는 모든 벽면에 칠판을 설치하여 모둠 수업, 협력 수업, 프로젝트 수업 등이 유리하도록 계획할 수 있다. 이때 해당 실은 모든 교과에서 공용으로 활용이 가능하도록 특정 교과의 교과교실이 아니라 공용교실에 적용하는 것이 바람직하다.

칠판(화이트 보드 등)이 여러 벽에 설치된 교실에서는 강의형, 모둠형 등 수업 형태에 따라 쉽게 책상 배열 변경이 용이하도록 이동식 책상, 의자를 활용한다.

21) 시청각실과 별개로 교과교실 내에서 정보전달 및 시청각 교육이 가능하도록 계획할 수 있다.

22) 교실 외부창호는 연창, 프로젝트창을 지양하고 가급적 미서기창으로 설치하여 자연환기가 용이하도록 고려하며, 학생들의 안전에 문제가 없도록 창호형태 및 높이 등을 계획한다.

23) 누수, 안전사고와 과도한 에너지 소모가 우려되는 천창을 지양한다.

24) 누수의 우려가 있는 화장실, 조리실 하부에 타 용도 실 계획을 지양한다.

25) 공사비 절감을 위해 필로티 공간을 최소화하며, 식당은 1층 배치를 우선 검토한다.

26) 학생 및 장애인의 편의를 감안하여 출입구의 턱 발생을 지양하고, 출입문의 개폐 시 불편함이 없도록 계획한다.

다. 에너지절약형 친환경 계획

1) 에너지 절약학교를 구현할 수 있는 건축계획 및 에너지절약 기법을 배치, 매스, 평면, 외피, 개구부 계획 등에 반영한다.

2) 패시브 계획 및 액티브 시스템을 통한 건물의 에너지 요구량을 최소화하여 에너지가 절감되도록 계획한다.

3) 쾌적한 학습환경, 환경교육자원으로서의 학교환경 조성이 가능하도록 계획한다.

4) 자연친화형 학교계획 및 부지현황을 고려하여 적절한 학교녹화가 이루어질 수 있도록 한다.

5) 건물의 재료는 자연친화적인 재료를 사용하거나 무독, 무해한 재료로 마감하여 자연환경과 친화되고 질적으로 개선된 환경이 조성되도록 계획한다.

6) 쾌적한 실내공기 환경 조성 계획을 반영한 에너지 절약 및 신재생 에너지 이용 계획을 수립한다.

라. 안전한 학교

1) 부지의 접근 동선(차량 및 보행자 등), 인접 대지와의 경계, 외부공간 구성, 시설 내부의 동선과 공간 확보계획을 사용자 중심으로 안전하게 설계하여야 한다.

2) 대지 내 보행자 안전을 우선 확보하고 보행 동선과 차량 동선이 간섭되지 않도록 계획

가) 화재 및 비상시 동선(대피・응급)을 계획, 소방 동선, 서비스 및 유지관리를 위한 별도의 동선 확보한다.

나) 증축 시 증가 면적에 대한 추가 주차 동선 계획 수립

다) 교사동과 강당간에 우천 시 대비할 수 있도록 외부동선 또는 실내동선을 확보할 것

마. 외부공간 및 기타계획

1) 디지털 기반의 스마트형 학습을 대응하기 위해 교지 어디서든 접근이 가능한 유·무선 네트워크망 구축을 계획한다.

2) 공간의 변형에 맞춰 학습형태, 모둠의 규모에 따라 자유롭게 배치가 가능하도록 이동이 쉬운 책걸상을 권장한다.

3) 건축물이 중정형식의 배치가 될 경우 일조에 불리한 공간들의 일조 확보방안을 제안하여야 한다

4) 가능한 학생들의 외부활동공간과 중첩되지 않는 범위 내에서 주차공간이 추가 확보될 수 있는 방안을 검토하여 계획에 반영한다.

5) 교사동간 연결 또는 교차하는 지점에 인접하여 야외수업, 외부 공연 등이 가능한 소규모 광장 또는 중정의 설치를 고려한다.

6) 안전한 학교환경 조성을 위해 「교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률」에 따른 안전인증제도 및 범죄예방설계(CPTED)인증제도, 장애물없는생활환경인증제도(BF) 등의 인증기준에 적합하도록 계획한다.

바. 입면 및 단면계획

1) 자연친화적인 소재(마감재 등)을 사용하여 인근 자연의 이미지가 부각 및 연계되도록 계획한다.

2) 외부로 면한 교실의 창 면적을 크게하여 교실 내에서 외부공간을 바로 조망할 수 있도록 계획한다.

3) 외부 입면은 교사동과 강당의 디자인과 연계될 수 있는 방향으로 계획한다.

3) 입면에 변화를 주기 위한 과도한 평면의 돌출이나 장식벽 등은 지양하고, 단순하면서 세련된 형태의 입면계획을 반영한다.

4) 교실창호, 식당, 다목적강당 등의 창호 설계시 채광 및 환기를 고려하되, 창호를 통한 열손실이 과다하게 발생되지 않도록 적정 창호 면적비를 산정하여 계획하며, 입면효과를 위한 커튼월 설계는 지양하고 해당실의 기능에 적합한 창호를 계획한다.

5) 층고는 실의 기능 및 경제성을 고려하여 최적의 방안을 제안한다.

6) 일반적인 학교 이미지, 형태를 과감히 탈피하고 미래지향적인 영주영일초등학교만의 정체성을 보여줄 수 있는 교사동의 형태를 적용한다.

사. 구조 계획

1) 구조는 철근콘크리트(RC), 철골구조(SS) 또는 철골철근콘크리트구조(SRC)로 한다.

2) 설계하중, 철골구조, 철근콘크리트구조 등은 재료규격 및 설계기준강도와 용도에 따른 하중조건 등을 검토하여 각 부분의 구조계획을 세밀히 설계해야 하며, 건축법 및 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 하중기준, 건축구조기준(국토교통부 고시 제2016-317호, 2016.5.31.) 및 학교시설 내진설계 기준(교육과학기술부 고시 제2009-13호, 2009.4.30.) 등 관련 규정에 적합해야 한다.

3) 지하층은 최소규모로 하되 바닥골조 및 벽체 등은 우수의 유입 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 설계한다.

4) 기둥계획은 대공간의 경우 실내 중간에 기둥이 위치하지 않도록 하며, 기둥이 동선에 지장을 주지 않도록 구조계획에 반영한다. 또한 통로 등에는 원형기둥의 사용으로 안전성을 확보한다.

아. 안전 및 범죄 예방 계획

1) 자연 감시(Surveillance)

① 학교 주출입구에는 외부인의 출입감시가 가능하도록 경비실을 계획하고 경비실의 위치는 보행자출입구와 차량출입구 사이에 배치하여 차량 및 보행자 출입을 동시에 감시할 수 있도록 한다.

② 주야간 건물출입 감시가 가능하도록 숙직실 및 행정실은 건물 주현관에 인접하여 배치한다.

③ 건물 주변 조경은 일조, 조망 등에 방해되지 않도록 대형 식재는 지양하고 건물과 일정간격을 이격하여 식재한다.

④ 교내 수목은 사각지대나 고립지대가 발생하지 않도록 식재하며 건물인근에는 시야확보를 위하여 가급적 관목류를 식재한다.

⑤ 부지경계에는 자연감시를 위하여 투시형 담장이나 생울타리를 설치하되, 학생안전, 학교생활지도, 지구단위계획지침, 주변 공원 및 휴게시설 등과의 연계성 등을 종합적으로 고려하여 적정높이와 재료 계획을 수립한다.

⑥ CCTV는 출입구 등 주요부위 외에 건물후면, 사각지대 등 자연감시가 취약한 부위에 우선 설치한다.

2) 접근 통제(Access Control)

① 지하층, 옥상층 출입구는 출입통제가 가능한 구조로 계획한다.

② 공사 차량 출입구와 통학로가 충돌하지 않도록 공사 차량 전용 출입구를 별도로 계획한다. 공사 중 통학 보행자를 위한 안전 통로와 울타리 설치 등을 포함한 보호 계획을 명확히 수립하여, 공사 차량 동선 분리와 인근 주민의 민원 최소화할 수 있도록 계획한다.

3) 영역성 강화(Territoriality)

① 건물 1층에는 운동장 등에서 교사동을 출입하지 않고 사용할 수 있는 야외 전용 화장실을 계획한다.

② 공사 중 학습권 보장: 가설 방음벽 및 소음 저감형 가림막 설치 등 공사 중 학생의 안전한 학습 환경을 보장할 계획을 수립한다.

4) 기타 참고사항

① 국토교통부 『건축물의 범죄예방 설계 가이드라인』 및 교육부『교육시설 안전관리 매뉴얼』에 따라 공간을 구획하고 필요한 안전시설을 계획하여야 한다.

② 모든 시설은 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률』등에 의거하여 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애인 동선, 편의시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립·반영하여 무장애(Barrier Free) 학교시설을 계획하도록 한다.

자. 중점 특화 공간 계획

1) 공간 혁신- 일반 교실 영역

- 교사의 중앙부에 교실을 집중시켜 연결된 복도공간(모임공간)을 통해 만남과 대화가 가능한 공간으로 학생과 교사간의 소통이 원활하게 함

- 교실과 복도를 연계하며 복도가 단순한 통과 공간의 기능에 더해 학습, 전시, 놀이공간 등으로 유연한 공간의 활용이 가능하도록 계획

- 전자 칠판 또는 터치스크린 설치를 통해 어느 방향에서도 배움이 실현되는 공간 필요

- 책걸상 교체로 학습 형태(모둠, 원형, ㄷ 등) 를 보다 손쉽게 이동가능하고 친환경적인 가구, 스마트 교실이 구현될 수 있는 교실, 빔 프로젝트용 스크린(교실 후면, 측면 등) 사물함 및 책장, 옷장 등 학생 편의 가구 배치를 통해 다양한 프로젝트 학습이 가능한 스마트 가변형 공간 구성 계획

- 학년군별 Zone 공유 교실 만들기 : 가변형 교실 설계로 학년별 협력수업과 특색 있는 교육과정 운영을 위해 유연하게 배치하고, 실내 가구 및 교구, 기자재 등을 학년별 주제에 맞게 설치 필요

- 심리적 안정과 몰입을 유도하는 디자인 등 시각적/기능적으로 연계해 하나의 학습 클러스터 구성

2) 공간 혁신- 공용 공간

- 1층 행정영역과 2~3층 학업공간을 분리하여 외부 방문자로부터 학생 공간의 독립성 확보.

- 1층 주출입구 옆 지붕이 있는 야외휴게공간을 만들어 갤러리 형식으로 구성하며 다양한 활동이 가능한 전이공간으로 활용

- 홈베이스를 1층에 배치하여 학생들의 접근성을 향상 시키며 도서관, 운동장, 야외공간과 연결하여 다목적으로 활용 가능

- 중앙부 중정 옆 개방형 계단실을 만들어 학생들의 쉼터공간/열린공간 확보

- 중앙 중정부분 상부 천창을 설치해 각층으로 자연채광 확보 및 친환경과 제로에너지 실현 가능하며 중정의 크기 조절가능하며 중정형 이외에도 전체적으로 채광 및 일조가 양호하도록 구성할 것.

3) 공간 혁신- 특별교실

- 서쪽 서천 수변공간 조망 고려하여 계획

- 음악실은 야외 휴게공간과 연계하여 계획

- 과학실↔ 미술실을 연계하여 실험공간과 제작공간을 유연하게 사용하여 상호 확장 가능하도록 계획

- 영체 교실은 가변형 벽체를 이용하여 필요 시 개방 확장하여 메이커 스페이스와 겸용하여 사용 가능

** 메이커 스페이스 겸용 교실 구성 원칙 **

- 유연한 공간 활용→ 일반 수업과 창작활동이 모두 가능하도록 가변형 가구 활용

- 협업 중심의 배치→ 토론과 프로젝트 활용 수업이 가능하도록 책상 배치

- 커뮤니티 공간: 메이커 스페이스, 다목적 교실, 야외 무대 등 학부모, 지역 주민이 참여할 수 있는 다양한 활동을 위한 공간 마련

4) 공간 혁신- 스마트 교실

- 교내 디지털 기자재의 효율적 유지관리로 스마트한 운영 체계 구축

- 스마트 교실↔ 야외 휴게공간↔ 도서관 간 연계를 통한 디지털 독서와 정보 검색, 특별교실을 활용한 융합형 학습 지원, 해당 층 돌봄교실과의 연계를 통한 방과후 학습, 자기 주도적 학습 지원이 가능하도록 계획

5) 그린 학교, 생태 환경 설계

- 정원과 연계한 휴게공간 및 생태 놀이터 활용

- 휴게 정원: 생태 관찰, 체험 수업 등 자연 속에서 휴식, 독서, 소규모 학습

- 생태 놀이터 및 학생 놀이터: 곤충 탐사 활동등 자연환경을 활용한 창의적 놀이 활동 공간으로 계획

- 옥상 공간을 이용하여 옥상정원을 설치하여 교내 건강한 휴식공간 마련

- 열섬현상 완화, 건축물 보호 효과, 생태교육 가능

- 교사동 내부에서 생태놀이터 및 휴게정원과의 상호확장 가능하도록 계획

6) 학교시설 복합화- 도서관

- 도서관 내부를 자유로운 공간으로 만들어 독서교육, 인성교육 등 다양한 교육활용을 할 수 있는 공간으로 이용

- 스마트교실과 연계하여 디지털 북 활용, AI독서보조 가능

- 서쪽 서천 수변공간 등 열린 조망 고려하여 계획

- 지역 주민은 방과후 1층 도서관에서 별도 출입할 수 잇으며 1, 2층 복층구조로 조성하여 부모 독서 모임 등 교육프로그램 운영 가능하도록 독서·문화·어울림이 가능한 공간 마련

- 도서관에서도 외부 활동과 연계할 수 있도록 야외 휴게공간과 연계하여 조성

- 지역 주민에게 개방을 고려하여 학습공간과 분리 가능하도록 계획하되, 이용자의 동선 분리로 안전관리에 유의하여 계획한다.

- 1~2층 복층구조로 계획하여 공간에 개방감을 부여하고 자연 채광 도입하며 열린 조망과 외부로 개방하여 야외 휴게공간과의 연결

※ 상시 개방 공간과 제한적 개방 공간을 구분하여 동선을 계획함으로써

학교 공간의 안전과 공공성 확보 고려

Ⅷ

설계도서 작성 및 납품

1. 설계 도서 작성

■ 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2024-907호) 별표(설계도서 작성방법)에 따른 단계별(계획·중간·실시설계) 설계도서를 작성하여야 한다.

가. 설계 설명서

1) 공통분야: 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 작성하여야 한다.

2) 건축분야: 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면·입면·주요 단면 선정, 구조·부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 주차계획, 동선계획, 전시 동선계획, 에너지절약 계획, 건축 구조계획, 공정계획 및 세부 공사비 등

3) 설계 설명서에 포함될 사항

가) 설계 주안점(테마, 스토리, 지역 특성 등)

나) 설계 진행과정 일체

다) 조감도, 설계 개요, 대지 현황, 우수시설 사례조사, 법규 검토서

라) 건축계획, 구조계획, 토목계획, 조경계획

마) 기계설비계획, 전기·통신계획, 소방계획 등

바) 그 외 발주기관에서 요청하는 사항

나. 각종 계산서 등

1) 각종 구조계산서, 지질조사보고서, 수리계산서, 에너지 절약계획서 등 포함

2) 물량산출서

- 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

- 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출하여야 한다.

다. 설계 도면

1) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성하여야 하며, 설계도서 상호간 모순·오기·누락·불분명성·외래어 표기 등이 없어야 한다.

2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성하여야 한다.

3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

4) 설계도면에는 주석(Note) 란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록하여야 한다.

5) 설계도면에는 관련 도면 란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면 명을 표기하여야 한다.

6) 설계도면 작성은 AUTO CAD 2012 소프트웨어와 상호 호환되는 제품을 사용하여 우리 청 컴퓨터와 완벽하게 상호 호환되도록 조치하여야 한다.

7) 설계도면 파일은 출력도면 외에 USB로 제출하여야 하며, 각 파일은 개별 열람 및 수정이 가능하도록 조치(파일압축 불가)하고, 도면 Font 및 Plot style 파일을 함께 저장하여 제출하여야 한다.(파일색인 목록 USB표지에 부착)

라. 주요 자재 선정 검토서 작성

1) 주요자재(시멘트, 철근, 레미콘 등)는 도급자 관급자재로 명기하여야 한다.

2) 주요자재에 대하여 상세히 비교·분석(특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품, 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 및 기능성, 안전성, 기밀성, 친환경성 등)한 자료를 서면으로 제출하여야 한다.

마. 공사 시방서

1) 공사시방서는 국토교통부 건설공사표준시방서를 기준으로 작성하여야 하며, 공사시방서를 작성할 경우는 자재·공사여건 등을 고려하여 당해 공사조건에 적합하게 시방서 내용을 수정·보완 또는 선택하여 시방서를 작성하여야 한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

- 해당 건설공사 표준공사시방서 및 전문공사시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

- 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

- 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

- 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 작성기준 등 필요한 사항

- 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기, 절차 등에 관한 세부사항

- 우리 청과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

- 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

- 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

- 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

- 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

- 기타 주요공사 사항

3) 공사 시방서 작성 시 유의사항

- 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

- 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성하여야 한다.

- 표준양식을 사용하도록 하고, 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

- 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성하여야 한다.

- 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성하여야 한다.

- 사용자재는 자재선정위원회에서 선정되는 등 특별한 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭 또는 일반적인 용어를 사용하여야 한다.

- 설계여건 상 신기술·신공법·특허공법·특허기술을 채택하여야 할 경우에는 동 기술이나 공법을 적용해야하는 사유(타당성, 비교 검토서 포함)을 제시한 후 우리 청에서 주관하는 공정성 있는 자재선정위원회를 통하여 결정하여야 한다.

바. 공사 내역서

1) 공사내역서 작성은 국토교통부 제정 건설공사표준품셈을 기준으로 하되 우리 청과 협의하여 적용하여야 하며, 내역서 파일은 조달청 및 우리 청에서 요구하는 파일로 제출하여야 한다.

2) 공사내역서는“지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준”에 의하여 산출하되, 아래 기준을 참고하여 산출한다.

가) 재료비

- 조달청장이 조사하여 통보한 가격(시장시공단가)으로 한다.

- 조달청장이 조사한 가격에 없는 자재는 기획재정부에 등록한 전문가격조사기관에서 조사·공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최적가격을 적용 하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

- 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 유효한 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 최적가격을 적용하여야 한다.

나) 직접노무비: 대한건설협회에서 공표한 시중 노임을 적용하여야 한다.

다) 일정규모 이상 공사에서 사용하는 자재는 발주자가 직접구매(관급)토록 관련사항을 설계도서에 표기하여야 한다.(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조)

라) 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우에는 관급자재의 범위 및 품목을 우리 청과 미리 협의하여 선정하고, 직접구매(관급구매) 할 수 없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하도록 관련 설계도서에 표기하여야 한다.(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조)

※ 직접구매 대상 자재는 공개경쟁입찰을 위한 특기시방서 및 물품규격서를 작성하여 제출하여야 한다.

3) 필요한 경우 공사비에 지장물 이설비, 에너지 인입 공사비 및 정밀안전진단비, 시운전비, 실내 공기질 측정비, 기타시험비, 친환경인증비, 기존 건물 철거비, 폐기물처리비(100톤이상 시 별도 작성) 등을 포함하여 내역서에 반영하여야 한다.

4) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 한다.

5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

6) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

7) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

8) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

9) 운반비는 목적지, 운반 장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

사. 예정공정표 작성

예정공정표는 PERT 또는 CPM 기법으로 작성하고, A3 규격으로 축소하여 제출하여야 한다.

아. 지장물 조서 및 인·허가 도서

1) 지장물 조서 작성

- 지장물은 우리 청과 협의하여 그 범위 등을 조사하여 결정하여야 한다.

- 사업시행으로 인해 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재하여야 한다.

2) 인·허가 도서 작성

- 관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 용 도서를 작성한다.

자. 기타

1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

2) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만 규격을 달리할 경우 우리 청과 사전협의하여야 한다.

2. 설계도서 납품

가. 추진단계별 설계도서의 납품은 시기는 다음과 같이 구분한다.

1) 계획설계: 착수일로부터 30일 이내

2) 중간설계: 착수일로부터 60일 이내

3) 실시설계 최종납품: 착수일로부터 240일 이내

나. 최종성과품 제출은 예비검사 등 모든 검토, 협의, 승인 등이 완료된 후 과업수행 종료일 전에 납품하여야 한다.

다. 최종 성과품의 종류 및 납품 수량

※ 납품 시 제출도서는 공사의 특성 및 종류에 따라 변경될 수 있음

구 분

규 격

납품수량

비고

1. 설계도면(공종별 구분)

A1출력, A3책철

3 부

A3출력, A4책철

8 부

A4출력, 좌편철

3 부

2. 설계원도(공종별 구분)

A3출력

제외

3. 건축축조승인서

(관련 서류 포함)

A4출력

2 부

4. 설계디스켓(USB)

(내역서, 산출서 포함)

·설계도서 일체

·설계도면 일체

2 개

1 개

5. 공사시방서

A4

8 부

6. 설계내역서

A4

3 부

7. 산출기초

A4

3 부

8. 일위대가표

A4

3 부

9. 서약서

A4, 참여기술자 전원

2 부

서명날인

10. 용역 참여기술자 명단

A4, 참여기술자 전원

2 부

서명날인

11. 구조계산서(구조확인서)

A4

8 부

12. 조감도(1컷)

60cm × 90cm

2 식

액자포함

조감도 사진 8×10'

10 매

액자 5매포함

13. 색채 계획서(도면 포함)

A4 책철

5 부

A3 좌편철

3 부

A4 색채계획 설명서

5 부

설계디스켓(USB)

2 개

14. 신기술적용 검토조서

A4

3 부

해당 시

15. 공사 예정공정표

네트워크식

5 부

감독1,감리1,증빙1,

현장1,사무실1

16. 지반조사 검토보고서

A4,

8 부

해당 시

17. 기타 용역수행 관련자료

담당공무원의 요구자료

3 부

해당 시 작성 제출

【붙임 1】 스페이스프로그램 : 구성은 다음과 같으나 설계자의 기획의도와 공간 활용에 따라서 변동되거나 통합될 수 있다.

※ 층별 배치 및 면적은 각 체험실 별로 특색 있게 구성하되 전체면적은 ±5% 범위 내에서 조정 가능

※ 창의적인 공간 구획을 위하여 유사 실과의 공용사용 및 통합 가능

경상북도영주교육지원청 행정지원과 제갈훈 E-mail : springmool@gbe.kr

☏)054-630-4281

가. 공간 혁신

• 일반교실 : 저학년교실과 고학년교실은 최대한 분리시키며 복도공간(모임공간)과 연계하여 통합/분리 계획하며 다양한 형태와 스케일 / 재질과 색상이 풍부한 상상력을 자극할 수 있는 공간 계획

• 공용공간 : 각층마다 야외 휴게공간을 만들어 다양한 홛롱이 가능한 전이공간 계획과 개방형 계단실을 만들어 쉼터/열린공간 계획

• 특별교실 : 서쪽 서천조망 계획과 음악실의 계단식 좌석, 영체교실은 가변형 벽체를 계획하여 공간의 가변성을 고려하여 계획

• 교육행정 및 지원공간의 효율화 및 집적화를 통해 자연스런 상호협업을 지원하는 공간조닝 고려

나. 스마트 교실

• 스마트교실 : 교내 디지털 기자재 구비와 효율적 유지관리로 스마트한 운영체계 구축

• 폴딩도어를 이용하여 야외 휴게공간과 연결 고려

• 설비의 지속적 업데이트 및 확장을 고려한 설비공간 계획

다. 그린학교

• 옥상공간 : 태양광 설치, 옥상조경 및 휴게공간을 계획하여 건강한 공간 및 에너지 절약을 고려

• 1층 휴게공간 및 생태놀이터: 정원과 연계한 휴게공간 및 생태교육공간 계획

• 건강한 학교생활을 위해 친환경 요소가 통합적으로 고려(조경/건축자재/에너지절약 등)

라. 학교 복합화

• 도서관 : 지역주민이 별도로 이용할 수 있도록 계획하며 주말에도 효율적으로 사용되도록 계획

• 커뮤니티 공간 : 메이커 스페이스 다목적교실, 야외무대 등 학부모, 지역 주민이 참여할 수 있는 다양한 활동을 위한 공간 마련

마. 안전

• 안전 : 학생들의 안전을 최우선으로 하여 지진, 화재 등 재난에 대비한 구조물 설계, 보안 시스템 계획

• 공사중 학습권 보장 : 가설 방음벽 및 소음저감형 가림막 등 공사 중 학생의 안전한 환경 고려

• 안전관리시스템 : 범죄예방을 고려한 명확한 출입동선/체온감지자동문 및 감염병예방공간 계획

• 현재 학교 공간의 위치별 동선 이용형태를 고려하여 안전성, 편의성, 기능성의 균형을 이룬 동선을 고려하여 전체공간 계획

【붙임 2】

1. 대지 현황

1) 대지의 형태 및 배치현황

영주 영일초등학교의 대지는 전체적으로 반듯하지 사다리꼴의 형태를 취하고 있으며, 전체 15,895.80㎡의 면적을 보유하고 있다. 공간재구조화 대상 건물인 본관동과 후관동은 대지의 북측에 배치되어 있고 남측에 강당이 위치하며 그 옆으로 운동장이 위치하고 있다.

영주 영일초등학교의 대지는 전반적으로 평지로 주출입구는 대지의 동측에 위치하며 부출입구는 서측에 위치해 있다. 주차공간은 본관동과 후관동 사이에 위치하고 있으며 학생들의 동선과 차량의 동선이 명확히 분리되지 않아 보행 안전성은  부족한 것으로 보인다.

현황도에서 보이는 바와 같이 대지 동측, 서측과 남측에 6m 도로를 면하고 있다. 출입구는 동측 도로변에 인접한 주출입구와 서측 도로변에 인접한 부출입구가 있다. 주출입구는 차량 이동과 보행이 모두 이루어지며, 보행자출입구와 차량출입구가 혼용되어 보행안전성이 우려된다.

2) 경사도, 향 및 조망

가) 경사도

대지는 전반적으로 평지이며 본관동 및 후관동의 향은 남향을 취하고 있고 주변에 고층 건물이 없어 채광, 조망은 양호한 것으로 판단된다. 향후 증축 시 교사동의 향, 채광 및 통풍을 고려하여 양호한 학습 환경이 조성될 수 있도록 계획해야 할 것으로 판단된다.

나) 소음

부지의 남측, 서측과 동측이 도로에 면하여 있다. 동측 주출입구의 전면에 위치한 6m 도로가 운동장에 면하여 차량 통행으로 인한 소음의 영향이 있을 것으로 보이나, 본관동 및 후관동과는 이격되어 있어 해당 도로들로 인한 소음의 영향은 적을 것으로 판단된다. 부지 동측으로 6m 도로에 면하여 저층 주거지가 밀집해있는 도로인 관계로 생활소음의 영향과 차량 통행으로 인한 소음의 영향이 경미하게 있을 것으로 보인다. 하지만 대지의 서측으로 6m 도로에 면하고 있어 서천둔치를 접하고 있어 소음의 영향은 적을 것으로 보인다. 따라서 본관동 및 후관동의 증축 시 서측, 동측, 남측 6m도로에 직접적으로 면한 대지이지만 소음의 영향을 적게 받는 성향의 실들을 도로면에 배치하는 등 주변 도로로 인한 소음 영향을 고려한 배치 계획이 이루어져야 할 것으로 판단된다.

【붙임 3】

주간 공정 보고

□ 용 역 명: 계약명 기재

□ 용역개요

○ 용역기간: 2025. . . ~ 2026. . .

○ 계약금액: 000,000,000원

□ 용역진행사항

구  분

전주 진행사항(2025. . .)

금주 진행사항(2025. . .)

비고(진행률)

업무내용

- 인원투입현황

- 외주작업 진행현황 등

- 주요 협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 기재

- 건축, 토목 등 분야별로 구분되도록 작성

(실시/예정공정)실시공정/예정공정(%)을 표기

특기사항

문제점 및 해결책 등 표기

주      소:

상      호:

대  표  자:

책임기술자:                   (인)

경상북도영주교육지원청교육장 귀하

【붙임 4】

월간 공정 보고

□ 용 역 명: 계약명 기재

□ 용역개요

○ 용역기간: 2025. . . ~ 2026. . .

○ 계약금액: 000,000,000원

□ 용역진행사항

구  분

월간 업무수행 내용(2025. . .~ 2026. . .)

비고(진행률)

첫째주

(실시/예정공정)

%로 기재

둘째주

셋째주

넷째주

다섯째주

기  타

- 공정 지연시: 지연의 구체적 사유 기재

주      소:

상      호:

대  표  자:

책임기술자:                   (인)

경상북도영주교육지원청교육장 귀하

감독1, 감리1, 현장1

감독3, 감리1, 현장2, 학교1, 보관1

증빙1, 보관2

감독3, 감리1, 현장2, 학교1, 보관1

감독1, 보관1, 증빙1

감독1, 보관2

감독1, 보관2

감독3, 감리1, 현장2, 학교1, 보관1

보관1, 학교1

감독3, 학교1, 보관1

현장2, 감리1

감독2, 보관1, 감리1, 현장1

감독3, 현장1, 보관1

감독2, 감리1, 현장1, 보관4