「음성군 산업단지 청년복합문화센터 건립사업」

과 업 지 시 서

2025.  .

	음 성 군 기업지원과

1. 과 업 명: 음성군 산업단지 청년복합문화센터 건립사업

2. 과업의 목적

청년층의 취업난과 창업의 어려움이 커지면서 지역 청년들이 일할 수 있는 환경과 기회와 지역 청년 유출 방지를 위해 지역 청년들이 자유롭게 모여 교류할 수 있는 문화 예술 공간, 커뮤니티 공간을 마련하기 위함.

문화생활 커뮤니티 공간에 대한 수요가 커지는 상황 속에서 청년들의 유입과 참여를 장려하여, 창업하거나 작업을 준비하는데 필요한 인프라 및 자유롭게 모여 교류할 수 있는 문화예술 공간, 커뮤니티 시설 건립 필요.

3. 과업 대상 지역

충청북도 음성군 금왕읍 오선리 579 일원(금왕생활권)

4. 과업의 규모와 내용

4.1 과업의 규모

세부시설계획(안)

❍규모: 45,745㎡(대지면적), 3,414㎡(연면적)

❍시설: 증축, 주차장 조성, 부대 조경 등

4.2 과업의 내용

4.2.1 일반사항

◦ 본 용역의 과업 범위는 토목, 건축(건축설비), 조경, 전기, 통신, 소방 등으로 한다.

◦ 설계안전보건대장 및 설계안전검토보고서 작성

◦ 각 분야별 친환경 설계 및 에너지절약 계획 등이 포함되어야 하며, 건축분야 단위 공간별(바닥, 벽, 천정재료) 친환경 재료가 포함되어야 한다.

◦ 분야별 과업은 토목, 건축, 조경, 전기, 통신, 소방 각 해당 분야의 전문기술자를 보유한 업체에서 수행하도록 하여야 한다. 단, 각 전문기술자를 보유한 업체의 협업도 가능하다.

◦ 세부설계는 기본계획 보고서를 기초로 진행하되 발주처와의 정기회의를 통해 충실히 반영하여야 한다.

◦ 계약상대자는 세부설계와 운영 프로그램 그리고 운영조직 간의 정합성 확보를 위하여 역량 강화 업체와 상시 소통하고 협력하여야 한다.

◦ 과업 수행 중 수반되는 각종 인허가 자료작성 및 협의, 지자체 공공디자인 협의 및 반영, 시행계획 수립 자료작성 및 협의, 안전진단(필요시 별도 발주) 실시 및 결과 반영, 농지전용, 산지전용, 하천점용, 도로점용, 문화재 현상 변경 허가 등도 과업에 포함된다.

◦ 도시계획 시설 결정 구역 내 실시설계 진행시 기 결정 내용과 사업계획이 상이할 경우 즉각 발주처에 통보하여 시설 결정 변경이 이루어지도록 하여야 하며, 계약상대자는 세부설계 완료 후 도시계획 시설 결정 실시설계 인허가 자료 작성 및 협의 등도 과업에 포함된다.

◦ 과업 수행 시 필요한 각종 제계산서(구조검토서, 응력검토서, 수리계산서 가설구조물 및 건축물 관련(신축 및 리모델링 증축 등) 구조계산서-구조기술사 확인 필수, 난방부하계산서, 오수처리량 산출서 등)을 첨부하여야 하며 지질조사, 임목축적 조사 등 설계를 위한 기초자료 작성을 포함하며, 구조적 안전검사 등의 제반 소요 비용은 설계자 부담으로 시행하여야 한다.

◦ 과업 진행과 내용 작성 시 발주처와 협의하여 진행하며, 발주처의 요구가 있을 시 자료를 충실히 작성하여 설명하고 각 용역주체 간 소통 및 협력하여야 한다.

◦ 기본계획 내용을 건축물의 규모, 예산, 기능, 질적, 미관적 측면에서 면밀히 검토하여 세부설계 성과물에 충실히 반영하여야 한다.

◦ 실시설계보고서에는 공법 및 자재비교표, 기본계획대비 변경사항, 회의록 등 세부설계 전반적인 내용이 포함되어야 한다.

◦ 철거 대상 건축물에 석면폐기물 발생시 ｢산업안전보건법｣ 제38조의2 및 ｢석면안전관리법｣ 제21조, 제22조에 따라 석면조사기관으로 하여금 석면조사를 실시하고 그 결과에 따라 조치한다.

◦ 설계용역 완료 후에도 설계용역, 설계의도구현과 관련된 각종 협의업무(사용승인 등) 협조 및 관련 자료를 제출하여야 할 것.

◦ 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 수급인의 협의 하에 수행한다.

4.2.1.1 현지답사

(1) 계약상대자는 현지 답사하여 지형 등의 자연상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여야 한다.

(2) 현지답사 시에는 반드시 사진 촬영하여 사진첩에 정리하고 구조물 계획시에 참고한다.

(3) 수급인은 현장조사 시 부지의 조건 등을 파악하여야 하고, 필요시 지질조사 등 필요 조치를 하여 설계에 반영하여야 한다.

4.2.1.2 계획설계 내용

◦ 설계대상이 되는 시설물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적 조건을 확정하기 위해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등의 업무

- 해당 법규검토, 설계방향 및 전기설비계획서

4.2.1.3 기타사항

(1) 설계 대상이 되는 시설물(건축물)에 공사비 예산을 확정하기 위해 예상공사비 제출

- 개략설계에 따른 공사비를 확정하여 필요시 설계과업 재조정

(2) 설계 대상이 되는 건축물의 주변 환경에 미치는 영향을 사전에 파악하는 업무

4.2.1.4 중간설계

◦ 중간설계는 본 과업의 중요성을 고려하여 계획설계 내용에 대하여 보다 세부적인 항목을 추가하여 구체화하고, 실시설계 단계에서 변경 가능성을 최소화하기 위해 합리적이고 경제적인 설계가 수행될 수 있도록 한다.

4.2.1.5 전기설비 설계(통신, 소방 포함)

(1) 전기, 통신, 소방 관련법에 의거 면밀히 검토

(2) 공사개요(공사위치 및 규모 설비범위, 기본방향, 공사금액 등)

(3) 설비운영계획(수변전방식, 수전용량, 운전 및 조작설비계획 등)

- 부근평면 작성 시 건축배치계획에 따라 전원인입 계획을 검토하여 설계

(4) 수변전설비(예비전원설비 포함)

- 전기사용량은 인테리어 및 전기사용설비를 감안하여 적정용량을 검토하여 적합하게 설계

(5) 전력간선설비

- 건축 배치 및 평면계획에 따라 전원인입 계획을 검토하여 적합하게 설계

(6) 조명 및 전열설비

- 조명등기구는 효율이 좋은 에너지 절약형(한전고효율 특별부담금 지급대상)이 우선 반영될 수 있게 설계할 것

- 조도는 KS조도 기준을 적용하고, 조명등기구 선정 및 배치는 주위와 조화를 이룰 것

- 건축배치 계획을 참조하여 옥외등을 적절히 배치할 것

- 전열구수는 건축 평면계획에 따라 적정 수량을 선정할 것

(7) 동력설비

(8) 정보통신설비(전화 및 OA, TV, 구내방송 등)

- 관련 기관 대외업무(시군 사용전 검사 등) 책임수행

- 건축주의 자문 및 협의 참석

- 정보통신 관련 적용대상 ｢정보통신공사업법｣을 면밀히 검토하여 설계할 것

(9) 피뢰침 및 접지설비

(10) 방재설비(소방설비 포함) - 필요시

- 관련 기관 대외업무(시군 소방허가 등) 책임수행

- 건축주의 자문 및 협의 참석

- 소방 관련 적용대상 소방법을 면밀히 검토하여 설계할 것

(11) 에너지 절약 방안

- 에너지 절약형 시스템으로 할 것

- 시간별, 용도별, 부하특성별 구역(ZONE)을 구분하여 에너지를 절감할 수 있도록 계획할 것

(12) 기타사항

- 각 분야별 시공 구분이 명확하지 않아 시공 시비가 예상되는 공종에 대해서는 분야별 협의를 거친 후 반드시 도면에 시공 구분을 명확히 할 것

- 성과품 납품 시 기존도면 및 관련 자료(법, 카탈로그 등)도 첨부하여 제출할 것

- 관련 기관 업무협의 내용을 보고서에 반영할 것

4.2.1.6 실시설계

◦ 실시설계는 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도를 적성한다.

4.2.1.7 적용자료 및 기준

(1) 본 과업에 적용하는 기준 및 자료는 출처와 근거를 제시하여야 한다.

(2) 정부에서 제정한 각종 시방서, 설계기준, 표준도 및 표준품셈을 적용하며, 국내외 각종 규격 및 규정에 맞게 설계하여야 한다.

(3) 사업비는 건축, 기계, 토목, 조경, 전기 등 공종별로 구분하여 최근의 정부공인 물가지(가격정보, 물가정보자료 등) 중 최저가를 기준으로 산정하며, 가격이 없는 경우 2개 이상의 견적 또는 신뢰성 있는 자료를 인용한다.(EBS 및 EMS 프로그램으로 작성하며 최종납품시에는 엑셀로 변환한 것을 함께 제출하여야 한다.)

(4) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조계산서, 공사비내역서, 발주처가 승인한 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

(5) 도면과 시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

(6) 수급인은 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주처에 제시한다, 수급인은 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에 설계도면을 수정하여 재조정토록 한다.

4.2.1.8 용역 내용

(1) 설정되는 조건의 상세한 파악(조건의 파악)

(2) 현지 상세 조사 및 확인

(3) 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

4.2.1.9 검토

(1) 각 부분 기능의 검토

(2) 공간 표현의 검토(형태, 사용재료)

(3) 공사비 및 시공기술의 검토

(4) 사용기기 및 사용 재료의 검토

(5) 유지관리 및 관계법령 조합 등에 관한 검토

(6) 공사비 계산과의 조정 및 각종 설계 등의 조정

5. 과업의 기간

5.1 과업의 기간: 착수일로부터 240일까지(인허가 기간 및 공휴일 포함)

5.2 계약상대자는 ｢용역계약일반조건｣ 제18조제3항, 제19조, 제24조 및 다음의 경우에 발주처의 승인을 얻어 과업 기간을 변경할 수 있다.

(1) 주민, 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

(2) 민원 발생에 의해 과업 수행이 지연 또는 불가능할 때

(3) 천재지변, 전쟁 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

(4) 발주처의 방침 변경 또는 지시에 의한 때

6. 과업 내용의 변경 조건

「용역계약일반조건」 제15조, 제16조, 제17조 및 다음의 경우에 계약상대자는 이 과업의 내용을 용역감독원과 협의하여 변경할 수 있다.

(1) 발주처의 방침 변경에 의한 과업 범위가 조정되었을 때

(2) 발주처의 추가 과업 요구로 과업 내용이 조정되었을 때

(3) 민원 발생에 의해 과업 수행이 지연 또는 불가능할 때

(4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

(5) 관계 법령의 개정 등 기타 불가피한 사유가 발생하였을 때

(6) 과업량의 증감, 과업 내용의 변경 또는 군이 필요하다고 인정할 때 및 과업 내용의 변경이 불가피할 때에는 계약범위, 내용, 비용, 기간 등을 변경 또는 정산처리 할 수 있다.

7. 주요 업무의 사전 승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 용역감독원과 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

(1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

(2) 자문 및 관계기관과의 협의사항

(3) 설계기준의 설정 또는 변경

(4) 기타 용역감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

8. 과업 수행 및 공정 보고

8.1 착수신고서 제출

｢용역계약일반조건｣ 제13조에 따라 계약상대자는 과업 착수 시 관련 법령에서 정한 서류와 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 계약일로부터 7일 이내에 발주처에 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

(2) 용역예정공정표

(3) 인력(장비)투입계획서

(4) 각 해당 분야(토목, 조경, 건축, 전기) 사업책임기술자 선임신고서

(5) 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

(6) 참여기술자의 보안각서

(7) 기타 법령이나 과업지시서에서 정한 사항

8.2 과업수행계획서 제출

계약상대자는 착수신고서 제출 후 현장 여건 등을 검토한 후 15일 이내에 다음 사항이 포함된 과업수행계획서를 제출하여 발주처의 승인을 득해야 한다.

(1) 전체 공정계획 및 분야별 세부공정계획서

- 세부공정별 과업수행계획은 과업의 난이도, 업무의 효율성 등을 충분히 고려하여 업무 분야를 명확하게 구분한다.

(2) 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

- 업무 분장에 따라 참여 인원과 구체적 작업 방법을 기술한다.

(3) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

(4) 기타 과업수행에 관한 사항

8.3 진도보고

8.3.1 계약상대자는 공정계획에 의거 과업 진척 사항을 발주처에 서면으로 보고해야 한다.

8.3.2 정기보고는 다음 사항을 포함한 월간진도보고서를 매월 말일을 기준으로 다음달 5일까지 용역감독원을 경유하여 군에 제출하여야 한다. 단, 전 공정기간이 100일 이내로 단기간인 경우 정기보고를 생략하고 필요시 수시로 보고한다.

(1) 과업 추진 실적 및 다음달 수행계획

(2) 참여기술자 투입 현황

(3) 시험실적

(4) 과업수행상 중요 문제점 및 대책

(5) 각종 도서 수발 현황(승인 사항 포함)

(6) 기타 필요한 사항

8.3.3 수시보고는 용역감독원의 요청이 있을 때 즉시 보고해야 하며, 긴급을 요하는 과업에 대하여 용역감독원이 진척 사항을 일일 보고토록 지시할 수 있다.

8.3.4 제출한 공정계획표와 실제 과업진도 간에 차질이 발생한 경우에는 계약상대자는 그에 대한 사유와 만회 대책을 수립하여 서면으로 제출하여야 한다.

8.3.5 계약상대자는 용역감독원의 요구가 있거나, 다음의 경우에는 관련 자료를 제출하고, 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 용역감독원의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치 결과를 서면으로 제출하여야 한다.

(1) 조사 및 자료수집 완료 시

(2) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

(3) 주요 계획의 설정 및 변경 시

(4) 분기 1회 이상의 중간보고 시

(5) 성과품 작성 및 준공 시

8.3.6 최종보고는 중간보고 및 기술검토 결과, 발주처의 의견 등을 반영하여 계약종료 15일 전에 실시하되, 용역감독원과 협의하여 일정을 조정할 수 있다.

8.4 민원 및 인허가, 인증, 심의 등 관련 업무협의 및 각종 보고 등

◦ 계약상대자는 과업을 수행하기 위하여 토지의 사용 및 벌목 등으로 인한 민원 또는 행정처분이 발생치 않도록 민원 및 대관 인허가 업무를 수행하여야 한다.

◦ 발주처는 본 과업과 관련한 각종 보고, 업무협의 등에 따른 보고자료 등을 작성 및 제공해야 한다.

◦ 계약상대자는 BF□제로에너지(5등급 이상) 인증 등을 관련법 또는 지자체 조례에 따라 필요시 실시하여야 한다.

◦ 계약상대자는 설계도서 납품 전에 관계법규에 의한 토목, 건축협의 등 인허가 및 협의 결과와 이에 대한 사항을 완료한 후 납품하여야 하며, 토목, 건축 인허가(정자, 파고라, 막구조물 등 포함) 및 제반 인허가에 소요되는 비용은 설계자 부담으로 시행하여야 한다.

◦ 계약상대자는 본과업의 건축 인허가를 요청 시기까지 득하고, 해당 허가번호와 직접 연결되는 설계변경, 사용승인 등 사업 종결 시까지 포괄위임 받아 관련서류를 작성, 제출하여야 하며 작성 자료에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다.

- 공사 착수 전: 건축허가/신고 및 관련 인허가(에너지 관련 심의 및 BF 협의 포함)

- 설계 변경 시: 변경허가 및 관련 인허가

- 공사 완료 시: 사용승인 및 관련 인허가

8.5 관계기관 협의 등

8.5.1 계약상대자는 관계기관 협의 등 요구에 부합하는 설계품질을 확보해야 하며, 용역수행기간 중 발주처가 시행하는 업무를 충실히 지원하여야 한다. 필요시 과업수행을 위해 요구되는 경우 발주처를 대행하여 업무를 수행하여야 한다.

8.5.2 계약상대자는 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여 용역감독원의 승인을 받아야 한다.

8.5.3 계약상대자는 협의 완료 후 협의 결과 및 추후 협의 일정(기한)을 용역감독원에게 즉시 보고하여야 하며, 용역 준공 시에 회의록 등 회의 자료를 정리하여 제출하여야 한다.

8.5.4 관계기관 등과 협의 시 회의 자료는 PPT 등 프로그램을 이용하여 발표를 진행한다.

8.5.5 세부설계 시 기본계획서 및 관련 서류를 바탕으로 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하기 위하여 3개의 대안을 제시하여 관계기관 설명회 등을 실시토록 하며, 관계기관 등의 이해를 도울 수 있는 투시도 또는 프로그램을 활용한 입체도면 등을 제시한다.

8.5.6 관계기관 등의 의견수렴 과정에서 제기된 의견 또는 본 과업 내용에 명시되지 아니한 사항(당초설계 기술심의결과 미반영된 사항, 주민요구 사항, 기타) 등에 대해서도 그 내용과 대책을 검토하여 용역감독원과 협의하여야 하며, 용역감독원의 지시가 있을 때는 성실히 수행하여야 한다.

8.5.7 세부설계(안)이 기본설계 내용과 다르게 변경되어 공사 시행 과정에서 민원 발생이 예상되는 경우에는 미리 관계기관 설명회 등을 통하여 그 내용을 알려야 한다.

9. 용역감독 등

9.1 용역감독원의 권한

발주처는 이 과업을 수행함에 있어 ｢용역계약일반조건｣ 제12조에 따라 본 과업을 담당할 용역감독원을 지정하며, 용역감독원은 수시로 다음의 계약 관련 업무내용을 확인·감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하고 지시사항을 이행하여야 한다.

(1) 기술인력 동원 현황

(2) 설계도서 작성 현황 및 업무수행상태

(3) 기타 확인에 필요한 사항

9.2 용역점검

발주처는 설계품질 확인을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 용역감독원와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

9.3 건설기술용역통합관리시스템(www.cems.kr) 활용

9.3.1 계약상대자는 계약체결 후 그 사실을 건설기술용역 통합관리시스템에 등재하여 관리해야 한다.

10. 계약상대자의 책임

10.1 계약상대자의 책임 범위

10.1.1 계약상대자는 발주처의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주처의 수정 보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정 조치하여야 한다.

10.1.2 계약상대자는 과업내용서의 업무 및 계약서에 명시된 계약조건을 성실히 이행하여야 하며, 과업과 관련된 중요한 모든 사항은 발주처의 서면승인을 득한 후 시행하여야 한다.

10.1.3 계약상대자는 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손실보상 등 모든 책임을 져야 한다.

10.1.4 발주처로부터 계획 변경 등으로 추가 과업을 서면으로 요청받은 경우에는 계약상대자는 과업 변경에 대한 검토서를 제출하여야 하며, 발주처로부터 추가 과업 내용 및 비용에 대한 서면 승인을 얻은 후 과업을 착수하여야 한다.

10.2 성과품에 대한 재조사 등

이 과업수행에 있어 용역감독원이 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재조사를 요청할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 하고, 이에 따른 소요비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

10.3 문서의 기록비치

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주처의 지시 및 조치사항 등 과업 추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성, 비치하여야 하며, 발주처의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

10.4 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

10.5 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계법규에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

10.6 적정사업비의 산정

◦ 계약상대자는 본 과업과 관련하여 당해 사업의 총사업비를 적정하게 산정하여 제시하여야 하며, 발주처가 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공 시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 설계 초기 단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축하여야 한다.

◦ 고의 또는 중대한 과실로 총사업비를 적정하게 산정하지 아니한 경우에는 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제76조에 의거 1개월 이상 2년 이하의 범위 내에서 정부사업 입찰참가자격 제한의 불이익을 당할 수 있다.

11. 적용규정 및 설계기준

11.1 주요 구조물 위치 및 규모 결정은 기본계획 시 선정한 위치를 원칙으로 하되, 변경이 필요할 경우 관련법 등을 검토하여 용역감독원과 사전협의를 하여야 한다.

11.2 각종 규정 및 설계기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 설계기준이 개정된 경우 동 관련규정 및 설계기준 등에서 규정하는 바에 따라 적용여부를 판단하고, 특별히 규정되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 적용한다.

11.3 관계법규 및 기준에 대해 명기한다.

11.4 통계자료는 공신력 있는 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

12. 과업수행 시 유의사항

12.1 조사측량 시 도근측량 기준점과 수준점을 공공측량 규정에 설치하고 도면에 표시한다.

12.1.1 조사측량 시 조사측량 목적, 토지 등의 출입 통지의무를 이행하여야 한다.

12.1.2 조사측량을 위한 장애물의 변경, 제거 등의 의무를 이행하여야 한다.
(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제101조 참조)

12.1.3 조사측량을 위한 임목벌채에 관한 허가 및 신고에 관한 의무를 이행하여야 한다. (「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제36조 및 같은 법 시행령 제42조부터 제43조, 같은 법 시행규칙 제44조부터 제47조 참조)

12.1.4 국토지리정보원에 측량 실시 이전에 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제17조에 의한 공공측량의 작업 규정에 의하여 작업 규정 승인을 득한 후 측량을 실시하고 같은 법 제18조 및 제19조에 의한 성과심사를 받아야 한다.(비용은 용역비에 포함되어 있다.)

12.2 재료의 운반 및 채취 장소는 사전 용역감독원과 협의하여 위치를 결정하고운반거리를 산출하여 위치도에 표시 제출한다.

12.3 콘크리트 구조물 설계는 콘크리트 표준시방서를 기준으로 하여 경제적인 설계 방법을 채택한다.

12.4 각종 수리, 수문, 구조계산은 농업생산기반정비사업 계획설계 기준에 의하고 미정립 분야는 용역감독원과 협의하여야 한다.

12.5 각종 수리계산서 및 구조물 안전도 계산서를 설계도서에 첨부하고 제 계산근거에 의하여 설계도서를 작성한다.

12.6 공사비의 산출근거는 건설공사 표준품셈 설계단가 적용기준에 의하여 적용하고, 각종 단가는 조달청 가격정보 최근호에 의한다.

12.7 주요시설 설치에 필요한 편입용지 토지 및 용지도 작성은 용역감독원의 사전 검사를 득하여야 한다.

12.8 본 과업 시행 중 다음 공종에 대해서는 용역감독원과 협의 후 시행한다.

(1) 현지조사 측량 착수 시

(2) 내업 착수 시

(3) 계획수립 조직(관계기관 등) 회의 결과 반영 시

(4) 각종 구조물 결정 시

(5) 수문조사 결정 시

(6) 사용골재 및 골재원 위치 결정 시

(7) 설계에 계상될 각종 재료단가 결정 시

(8) 기타 중요한 내용 결정 시

12.9 중대한 상황의 변동으로 과업의 내용을 변경해야 할 경우에는 발주처와 계약상대자의 상호 협의하에 과업의 범위, 비용 및 과업기간 등을 변경할 수 있다.

12.10 과업지시서에 명기되지 않은 부대 업무에 대한 용역감독원의 요구가 있을 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

12.11 실시설계의 초안 성과품을 작성하여 용역감독원의 검토를 받도록 하고 수정 및 보완이 필요한 경우 이에 따라야 한다.

12.12 모든 인허가는 용역 완료와 동시에 득해야 하나, 사업 성격상 용역 후 공사 착수여건에 따라 지연될 수 있는 관계로 계약상대자는 인허가 도서(제반서류)를 최종기관 확정 승인 후 발주처의 요청에 의하여 해당관청에 제출, 제반 인허가(대지 관련 인허가, 건축 인허가, 설비 관련 인․허가 등)를 필히 득하여야 하며, 공사 착공 전 건물 위치 변경이 있을 경우 이에 따른 인허가 업무도 수행하여야 한다.

13. 대내외 인허가 및 심의자료의 제출

계약상대자는 이 사업추진을 위해 과업 중 또는 완료 후 각종 관계법규에 따라 사전 인허가 및 심의 등이 필요한 사항들을 파악하여야 하며 용역감독원이 요구 시 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

13.1 제출자료

이 사업과 관련하여 각종 인허가, 협의 및 심의용으로서 필요에 따라 다음과 같은 자료들이 작성, 제출되어야 하며 이에 한정되지는 않는다.

(1) 하천법 등과 관련 승인 및 협의신청자료(하천공작물 신축 등)

(2) 용지보상조서 및 용지도 원본 및 사본

(3) 도로점용 및 농지전용 협의 신청자료

(4) 설계 관련 회의 및 보고자료

(5) 관계기관(에너지, 장애인, 소방서, 문화재, 경찰서 등) 협의자료

(6) 문화재 지표조사 사전협의 관련 자료

(7) 기타 인허가 신고 및 심의자료

14. 조사설계 사전검토, 기술심의(검토) 및 결과의 반영 등

14.1 계약상대자는 본 용역과 관련하여 발주처의 기술심의규정(기술검토회 규정 포함)에 따라 기술심의 또는 기술 검토를 받아야 하며 심의 및 검토 자료를 용역감독원에게 제출하여 검토 받아야 한다.

14.2 계약상대자는 기술심의 또는 기술검토를 과업완료 7일 전에 요청할 수 있도록 필요한 제반 자료를 제출하여야 하며, 기술심의(검토) 제출 자료는 과업지시서에 규정된 모든 사항이 이행된 성과물로서 제출되어야 하고 심의료 지급 등 소요경비를 부담한다.

14.3 계약상대자는 용역감독원의 요청이 있는 경우 과업 참여기술자로 하여금 발주처의 기술심의위원회에 참석하여 심의자료 설명 및 심의에 임하도록 하여야 한다.

14.4 계약상대자는 심의 결과 지적사항에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 이 과업에 반영, 조치하여야 하고, 과업 수행과 관련된 심의 지적사항에 대한 조치결과서를 작성하여 용역감독원에게 제출하여야 한다.

14-1. 가설구조물 구조검토 등

14-1.1 계약상대자는 목적 시설물의 시공을 위해 필요한 가설구조물의 설치가 요구되는 경우에는 관련 규정에 따라 구조검토를 실시하고 구조계산서, 도면 등을 성과물로 제출하여야 한다.

14-1.2 구조 검토를 실시하여야 하는 가설구조물은 다음과 같다.(「건설기술진흥법」 제48조 관련)

(1) 높이가 31미터 이상인 비계, 높이가 5미터 이상인 거푸집 및 동바리

(2) 터널의 지보공 또는 높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공

(3) 공용되는 가설교량 및 노면복공

(4) 그 밖에 발주자가 필요하다고 인정하는 가설구조물

14-1.3 계약상대자는 ｢건설기술진흥법｣ 제62조제7항 및 같은 법 시행령 제101조의 가설구조물의 시공상세도 작성 및 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용을 사업비에 계상해야 한다.

14-1.4 계약상대자는 「건설기술진흥법 시행령｣ 제98조제1항에 따라 안전관리계획 수립 대상의 실시설계(세부설계)를 할 때에는 「건설기술진흥법 시행령｣ 제75조의2에 따라 설계 안전성 검토를 실시하고 안전성검토 보고서를 성과물로 제출하여야 한다.

14-1.5 설계 안전성 검토에 관한 세부사항은 관계법규에서 정하는 바에 따른다.

15. 관계기관 의견수렴

15.1 계약상대자는 관계기관 협의 등 용역수행 기간 중 발주처가 시행하는 업무를 충실히 지원하여야 한다. 필요시 과업 수행을 위해 요구되는 경우 발주처를 대행하여 업무를 수행하여야 한다.

15.2 계약상대자는 관계기관과 업무협의를 하기 전에 협의할 내용 및 자료 등에 대하여 용역감독원의 승인을 받아야 한다.

15.3 계약상대자는 협의 완료 후 협의 결과를 용역감독원에게 즉시 보고하여야 하며, 용역 준공 시에 회의록 등 회의 자료를 정리하여 제출하여야 한다.

15.4 관계기관 등의 의견수렴 과정에서 제기된 의견에 대해서는 그 내용과 대책을 검토하여 용역감독원과 협의하여야 한다.

16. 용역대가의 지급

16.1 ｢공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부 고시 제2020-635호, 2020.9.14.)｣ 제6조(설계업무) 별표2(건축설계에서의 도서 작성) 중 계획설계의 도서 내용은 “중급”을, 중간설계 및 실시설계의 도서 내용은 “중급”을 적용하는 것을 원칙으로 하되, 납품 시 발주처와 협의하여 조정할 수 있다.

16.2 이 과업지시서와 기타 계약문서에 특별히 기술하지 않는 한 용역대가는 산출내역서 상의 계약금액으로 하되, 불가피하게 과업 범위가 변경될 경우 용역감독원과 협의하여 조정한다.

16.3 과업 수행 시 필요로 하는 자문비, 위촉연구비, 조감도, 인쇄비, 현장조사비 등 과업을 완수하기 위한 일체의 제반 경비는 계약상대자 자부담으로 시행한다.

16.4 용역 완료 후에라도 이 과업과 관련한 발주처의 정당한 보완요구 사항에 대해서는 즉시 보완, 제출하여야 하며 그에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

16.5 관계기관 등의 반대, 사업취소, 사업내역 변동 등 부득이한 사유로 계약업무를 수행할 수 없을 때에는 발주처의 조사 중단 확정일까지 과업에 소요된 제비용은 실비정산 할 수 있다.

16.6 과업의 종료는 사업계획 확정·승인기관의 승인을 득한 때로 한다.

17. 보안 및 비밀유지

17.1 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주처에 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야 한다.

17.2 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

17.3 과업 성과품에 대한 보안

17.3.1 본 용역을 위한 제반 성과품 및 작업 발생품에 대하여 일체 계약상대자가 소유할 수 없으며 본 계약의 목적 이외에 사용하여서는 아니되고 과업의 계획과 성과품에 대한 사항은 일체 대외비로 한다.

17.3.2 본 용역을 위하여 작성된 성과품 및 작업 발생품에 대하여는 용역감독원 및 관련 부서 외는 열람할 수 없으며 계약상대자는 이의 보안에 철저를 기함과 동시에 취급 또는 보관 부주의로 인한 제반 보안 사고나 이해관계가 발생할 경우에는 일체 그 책임을 진다.

17.3.3 용역감독원은 계약상대자의 보안관리 상태를 점검할 필요가 있다고 판단될 때 보안유지를 위하여 필요한 지시를 할 수 있으며 계약상대자는 이 지시에 의하여 모든 조치를 취하여야 한다.

18. 용어의 해석

과업내용서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주처와 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 하며, 협의된 해석은 서면으로 작성한다.

19. 용역수행자의 교체

19.1 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 용역감독원이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

19.2 이 과업에 참여하는 기술자 중 사업수행능력 평가시 참여토록 계획된 사업책임기술자와 분야별 책임기술자 등이 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 사전에 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 기술자로 발주처의 승인을 받은 후 즉시 교체한다.

20. 기타 사항

20.1 하도급에 관한 사항

20.1.1 계약상대자는 본 설계용역을 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

20.1.2 계약상대자가 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

(1) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

(2) 토질조사와 이에 부수되는 시험 등의 작업

(3) 기타 발주처가 특별히 인정하는 업무(특별 과업 등)

20.1.3 계약상대자는 위 항에서 규정하고 있는 하도급으로 처리할 수 있는 사항에 대하여 하도급을 하고자 할 경우 하도급 계획서를 제출하고 발주처의 승인을 받아야 한다.

20.1.4 계약상대자는 도급 받은 용역에 관하여 하도급 계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주처에 통지하여야 한다.

(1) 하도급 계약을 체결할 용역의 범위

(2) 하도급 받을 용역업자와 참여기술자의 현황

(3) 하도급 기간 및 하도급 금액(율) 등

20.1.5 계약상대자는 용역의 일부를 하도급한 경우에도 본 설계용역에 관하여 모든 책임을 진다.

20.1.6 계약상대자는 하도급 관련 업무 수행에 있어 ｢하도급거래 공정화에 관한 법률｣ 등 관계법규에서 규정하고 있는 사항을 준수하여야 한다.

20.2 지적소유권 등의 사용

계약상대자는 이 과업의 수행에 있어 제3자의 권리대상으로 되어 있는 지적소유권, 특허권 등을 사용할 때에는 그 사용에 대한 일체의 책임을 져야 한다.

20.3 위반행위의 조치

다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 특별한 사유가 없는 한 계약위반 행위로 간주하여 관계 규정에 의거 조치할 수 있다.

(1) 제반 지시사항(서면, 구두)을 기한 내에 이행치 않을 때

(2) 계약기간 내 과업을 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 용역 진척이 지연될 때

(3) 과업 수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

(4) 과업의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주었을 때

20.4 계약의 해지 등에 관한 사항

발주처는 다음 사항에 대하여 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 어떠한 보상도 받을 수 없으며 부정당업자로 제재할 수 있다.

(1) 계약상대자의 부도 및 기타 경영, 과업참여 인력 운영상의 중대한 사유로 과업 수행이 불가능한 점이 명백히 인정되었을 경우

(2) 계약상대자가 과업을 이행함에 있어 고의 과실 또는 무성의로 과업이 지연되거나 시정 요구사항이 이행되지 않아 과업의 정상 수행이 어렵다고 발주처가 인정하였을 경우

※ 불이행 시 ｢국가계약법 시행령｣ 제75조에 의거 해지할 수 있음

20.5 기타 유의사항

20.5.1 이 과업에 기술되어 있는 모든 사항은 상호 보완적이며, 명기되지 않은 사항이라도 당연히 수행되어야 할 사항에 대하여는 계약상대자 부담으로 시행하여야 한다.

20.5.2 이 과업 수행과정에서 이견이 발생할 경우 계약상대자와 용역감독원은 상호 평등의 원칙에서 협의하여 조정하며, 기타 경미한 내용은 용역감독원의 의견에 따라 과업을 수행하여야 한다. 특히, 과업 수행 상 필요하다고 판단하는 과업에 대한 수행방법 및 작업과정을 용역감독원이 요구할 경우 즉시 제시하여야 하며, 용역감독원은 확인 및 조정을 지시할 수 있다.

20.5.3 계약상대자는 과업 종료 후에도 과업 성과와 관련한 관계기관 업무협의 등에 협조하여야 한다.

20.5.4 이 과업의 수행 과정에서 생성된 자료와 개발된 분석 기법 등 모든 성과품의 소유는 발주처에 있고, 계약상대자는 이를 임의로 소유, 복제 또는 외부로 유출해서는 안되며, 이의 불이행으로 인한 책임은 계약상대자가 진다.

20.5.5 관계법규 및 본 과업지시서에 명시되지 않는 사항은 국내외 공공기관에서 정한 관련 기준에 따르되 발주처와 사전 협의하여 결정하여야 한다.

21. 성과품의 제출

21.1 일반사항

21.1.1 모든 용역 성과물의 형식 및 규격은 발주처에서 제공하는 양식에 의하여 작성하여야 한다.

21.1.2 주요시설물(계획)에 대한 시설 전·후의 사진을 보고서에 첨부 또는 삽입한다.

21.1.3 설계도서 및 보고서 작성시에는 국제단위계(SI)를 사용하여야 하며, 도면상의 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나 한글사용을 원칙으로 하고, 글씨체는 돋움(권장)으로 하거나 발주처와 협의 후 결정한다. 숫자는 아라비아 숫자를 사용하며, 공종별 도면의 문자와 숫자 양식이 모두 통일되도록 한다.

21.1.4 용역성과 작성 시 인용된 참고자료는 각주에 의거 출처를 명확하게 명시 하여야 한다.

21.1.5 성과품의 표지와 도안의 규격 및 인쇄 방법에 대하여 용역감독원과 사전협의하여야 하며 인쇄물의 지질, 색도 등에 대해서도 사전 협의하여야 한다.

21.1.6 중간 성과물은 공정상 50% 시점에 5부를 작성 제출하여야 하며, 내용은 단계별 공정계획에 따른 분야별 추진사항 등이 수록되어야 한다.

21.1.7 중간 성과물 제출 시 시설의 계획, 규모, 위치 등을 함께 제출하여야 한다.

21.2 설계도면

(1) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

(2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

(3) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주처와 협의하여 결정한다.

(4) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정 여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

(5) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요 설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

(6) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

(7) 모든 도면은 CAD시스템을 이용하여 작성하되 도면 구성 요소에 대한 공종별 양식을 통일하고, 그 결과를 USB에 저장해 제출한다(CAD 폰트는 굴림, 궁서, 돋움, 나눔고딕, 맑은고딕체에 한하여 사용해야 한다). 제출하는 도면 및 양식은 발주처의 설계도면 및 문서 납품기준을 준수한다.

21.3 공사시방서

(1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관계법규 등을 근간으로 발주처 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

(2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

◦ 적용 범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

◦ 해당 건설공사 표준시방서, 관계법규 및 지침, 제기준의 명칭

◦ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

◦ 관계법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

◦ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

◦ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

◦ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

◦ 기타 주요공사 사항

(3) 공사시방서 작성 시 유의사항

◦ 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

◦ 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

◦ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성 형식의 일관성을 유지하도록 한다.

◦ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

◦ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

◦ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

◦ 공사 기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

◦ 발주처의 의도를 정확히 파악하고, 용역감독원, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

◦ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

(4) 공사시방서 작성 시 국토교통부 제정 표준시방서를 기준으로 작성하여야 한다.

21.4 설계예산서

(1) 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서로 구별한다.

(2) 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

(3) 총괄내역서에는 제경비 산출근거가 포함되어야 한다.

(4) 노임기준은 당해년도 공사노임단가(대한건설협회)를 기준으로 한다.

(5) 재료비는 정부구매물자 가격정보를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

(6) 품셈은 당해년도 건설공사 표준품셈에 준한다.

(7) 중기손료 작성 등 필요한 공통 단가는 발주처가 정하는 것을 원칙으로 한다.

(8) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주처와 상의하여 1~2개 업체 이상의 견적서를 기준으로 적용할 수 있다.

(9) 설계단가는 위 내용에도 불구하고 발주처가 요구하는 단가를 적용할 수 있다.

(10) 설계예산서는 회계예규 원가계산에 의한 예정가격작성 준칙에 의거 작성한다.

(11) 설계예산서(내역서)는 납품 후 공사 착공시 정부노임 및 단가가 변경 되었을 경우 발주처의 요청에 의거 당해연도 단가로 보완하여야 한다.

(12) 모든 내역서는 EBS 및 EMS시스템을 이용하여 작성하되 내역서 구성 요소에 대한 공종별 양식을 통일한다.

21.5 설계설명서(사업설명용 차트 등)

(1) 문서는 PPT 파일형식으로 작성한다.

(2) 과업 범위 안의 설계 전체에 대한 컨셉, 의도, 목적 등을 설명한다.

(3) 최종 설계도서 납품 시 설계설명서를 요약하여 패널(A1, 594×841mm)을 제작하여 납품한다.

21.6 인허가 도서 작성

관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인허가 요청용 도서를 작성한다.

21.7 기타 유의사항

(1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는 KS A 5201의 A1~A3에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

21.8 제출 성과물

(1) 용역기간 중 제출서류 목록

- 계획설계 시 납품도서

번호	항 목	제출목적	규격	수량	제 출 일
1	착 수 계	승인용	A4	2	계약후 7일 이내
2	과업수행계획서	승인용	A4	2	계약후 15일 이내
3	월간공정보고	중간보고용	A4	1set	매월 30일
4	안전관리계획수립	안전사고 예방	A4	1	착수 시
5	회의자료	시행계획 협의	A4	필요부수	회의 시
6	시행계획도서	일상감사 및 계약심사용	A3/A4	3set	시행계획 수립 전

- 중간설계 시 납품도서

번호	항 목	제출목적	규격	수량	제 출 일
1	계획설계보고서	승인용	A4	5set	중간보고 시
2	계획설계	승인용	A4	5set	중간보고 시
3	중간성과물	중간보고용 및 승인용	A4	5set	50% 진행 시점
4	현장조사보고서	중간보고용 및 승인용	A4	5set	회의 시
5	관계법규검토서	승인용	A4	필요부수	회의 시

- 실시설계 시 납품도서

번호	항 목	제출목적	규격	수량	제 출 일
	건축총괄 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방
1	설계도서	최종납품	A3	7set	시행계획 수립 즉시
2	설계설명서(패널)	최종납품	A1	7set	시행계획 수립 즉시
3	실시설계보고서	최종납품	A4	5set	시행계획 수립 즉시
4	각종계산서	최종납품	A4	7set	시행계획 수립 즉시
5	내역서	최종납품	A4	7set	시행계획 수립 즉시
6	관급내역서	최종납품	A4	7set	시행계획 수립 즉시
7	수량산출서	최종납품	A4	7set	시행계획 수립 즉시
8	단가산출서	최종납품	A4	7set	시행계획 수립 즉시
9	일위대가표	최종납품	A4	7set	시행계획 수립 즉시
10	시방서	최종납품	A4	7set	시행계획 수립 즉시
11	예상공정표	최종납품	A4	7set	시행계획 수립 즉시
12	조감도	최종납품	A1	2set	시행계획 수립 즉시
13	사업별조감도	최종납품	A1	2set	시행계획 수립 즉시
14	USB	최종납품	USB	3set	시행계획 수립 즉시
15	기타요구사항	최종납품			요구수량

〔붙임 1〕 착수계

착   수   계

1. 용    역    명: ○○○○○ 설계용역

2. 계  약  금  액: 금○○○○○원정

(￦○○○○○원) ※ V.A.T 포함

3. 계  약  일  자: 202  .   .   .

4. 착  수  일  자: 202  .   .   .

5. 완 수 예 정 일: 202  .   .   . (착수일로부터 ○○일)

상기와 같이 설계용역 착수계를 제출합니다.

202 .   .   .

	○ 대표계약자	업체명:
		대표자:		(인)
	○ 공동계약자	업체명:
		대표자:		(인)

음 성 군 수 귀하

〔붙임 2〕 보안각서

보  안  각  서

1. 용  역  명: 음성군 산업단지 청년복합문화센터 건립

2. 계 약 일 자: 20  .    .    .

3. 착 수 일 자: 20  .    .    .

4. 완료예정일: 20  .    .    .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행 과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 「용역계약일반조건」 규정에 따라 용역수행 기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주처에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 「건축사법」 제20조(업무상의 성실의무 등)제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 용역계약 일반(특수)조건 규정에 따라 발주처에 귀속됨을 알고 별도로 발주처의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20    .    .    .

주       소:

생 년 월 일:

기 술 분 야:

성       명:                   (인)

음 성 군 수 귀하

〔붙임 3〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자  선 임 계

1. 용  역  명: 음성군 산업단지 청년복합문화센터 건립

2. 계 약 금 액: ○○○원

3. 계 약 일 자: 20  .   .   .

4. 착 수 일 자: 20  .   .   .

5. 완료예정일: 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명:

나. 주        소:

다. 주민등록번호:

라. 기술자격(면허)종별:

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20   .    .    .

계  약  자:

주      소:

상      호:

대  표  자:                (인)

음 성 군 수 귀하

〔붙임 4〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명: 음성군 산업단지 청년복합문화센터 건립

2. 계 약 금 액: ○○○원

3. 계 약 일 자: 20   .   .   .

4. 착 수 일 자: 20   .   .   .

5. 완수예정일: 20   .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야: (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액:

다. 하도급자

- 주    소:

- 상    호:

- 대 표 자:

- 보유면허:

붙임: 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부.
2. 하도급계약서 사본 1부.
3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부.

상기 자에게 ○○○분야 설계용역을 하도급 하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20   .    .    .

계  약  자:

주      소:

상      호:

대  표  자:

음 성 군 수 귀하

〔붙임 5〕 설계검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용  역  명: 음성군 산업단지 청년복합문화센터 건립

2. 계 약 금 액: ○○○원

3. 계 약 일 자: 20  .   .   .

4. 착 수 일 자: 20  .   .   .

5. 완료예정일: 20  .   .   .

붙 임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20   .    .    .

계  약  자:

주      소:

상      호:

대  표  자:

음 성 군 수 귀하

〔붙임 6〕 주간 공정보고

주간 공정보고

◦ 용  역  명: 음성군 산업단지 청년복합문화센터 건립

◦ 현 장 위 치:

◦ 용 역 기 간: 20  년  월  일 ∼ 20  년  월  일

◦ 계 약 금 액: ○○○원

◦ 용역진행사항

구 분	전주 진행사항 (20 . . .~ 20 . .)	금주 예정사항 (20 . . .~20 . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정 / 예정공정(%) (공정률)표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주      소:

상      호:

대  표  자:

책임기술자:           (인)

음 성 군 수 귀하

〔붙임 7〕 월간 공정보고

월간 공정보고

◦ 용  역  명: 음성군 산업단지 청년복합문화센터 건립

◦ 현 장 위 치:

◦ 용 역 기 간: 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 계 약 금 액: ○○○원

◦ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비 고
첫째주		실시 / 예정공정 (%)(공정률)표기
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	공정 지연시 지연의 구체적 원인 표기

주      소:

상      호:

대  표  자:

책임기술자:           (인)

음 성 군 수 귀하