과업지시서

2025. 09.

장곳항 어촌스테이션 조성사업

건축설계용역 과업지시서

강 화 군

목    차

1. 총  칙	1

�   과업의 명칭	1

�   과업의 목적	1

�   과업의 개요	1

�   적용법규 및 기준	2

�   과업의 내용	3

�   과업시행 방법 및 준수사항	3

�   설계용역 일반사항	7

�   발주청과 수급인의 책임 및 의무	11

2. 설계 진행사항	14

�   설계도서 작성	14

�   설계 진행 시 제출서류	14

�   업무회의	16

�   사용자재	17

�   관련기관 인·허가 협조	17

�   하도급 범위	18

�   각종 조사 및 자료수집	18

3. 일반지침	20

�   기본방향	20

�   일반조건	20

□ 적용기준	21

�   건축 세부지침	22

�   기타 세부지침	24

�   부분별 설계지침	25

4. 설계도서 작성요령 및 성과품 납품	38

�   설계도서 작성요령	38

�   설계도서의 분리작성	39

�   설계도서 표기	40

�   성과품의 납품시기	40

�   성과품의 납품목록	41

�   [붙임1] 기본설계내용	44

�   [붙임2] 실시설계내용	50

5. 첨부서식	58

제1장 총칙

1. 과업의 명칭

과업의 명칭은『장곳항 어촌스테이션 조성사업 건축설계 용역』이라 한다.

2. 과업의 목적

○ 해양수산부 어촌신활력증진사업(유형2) 추진에 따른 어촌 정주·경제 환경 개선을 위한 어촌 생활플랫폼 조성

○ 지역 어업생산략의 주요 소비처인 현 직판장 노후화에 따른 방문객 감소에 따라 시설 확충

○ 인근 생활권역에 비해 부족한 주민 편의시설(복지 등) 확보

○ 사업대상지는 장곳항 친수공간 및 역사문화환경보존지역 내에 위치하고 있어, 주변 경관과의 조화, 문화자원과의 연계, 지역적 정체성을 고려한 설계적 대응이 요구됨에 따라, 기능적인 개선을 넘어 장소성과 공공성을 아우르는 공간으로 구성하고, 보행 및 시각적 흐름, 커뮤니티 환경에 대한 통합적 접근을 요구함

3. 과업의 개요

구 분	내 용
공 모 명	장곳항 어촌스테이션 조성사업 건축설계 용역 (간이)공모
사업위치	삼산면 매음리 1048-1, 1048-16 (2필지)
부지면적	3,709.70 ㎡
지역지구	계획관리지역, 역사문화환경보존지역
건물규모	어촌스테이션(연면적 750㎡, 지상2층), 창고(연면적 85㎡) (±5% 범위내 조정가능)
용 도	제2종 근린생활시설(수산물 직판장, 일반음식점)
예정 공사비	금 3,522,870,000원 (부가세 포함)
설계 용역비	금 180,391,000원 (손해배상보증보험, 추가과업, 부가가치세 포함)
설계기간	착수일로부터 120일(공휴일 포함)
공사기간	8개월(예정)

1) 예정공사비에는 건축, 조경, 토목, 전기, 통신, 소방, 기계 등에 대한 전체 공사비로 전기/수도/가스 등의 각종 인입비용의 조사·공사비 등 일체를 포함하며, 예정공사비 사업예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.

2) 설계용역범위 : 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리비 등 제반분야의 설계비 및 제로에너지건축물, BF예비인증, 설계안전성검토, 설계의 경제성 검토(VE) 등 제반 행정절차 이행과 건축협의/설계자문/심의/심사 등 발주처가 요구하는 신청 및 보고자료 등에 관한 용역이 포함된 사항임.(건물 준공시 건축물대장 작성 및 제출-건축행정시스템등록)

3) 설계 용역비에는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등의 설계비와 각종 협의, 심의, 인증 등 일체의 비용 포함임.

[단, 공공(인증)기관에 납부하는 검토·인증수수료는 발주기관 부담]

4) 본 용역비에는 「건축서비스산업 진흥법」에 따른 설계의도구현 대가가 포함되어 있지 않으며, 별도 계약예정

(기본설계 : 착수일로부터 30일 이내, 실시설계 : 기본설계 확정 후 90일 이내)

※ 단, 설계심사, 설계자문, 계약심사, 건축허가 등의 사유로 인하여 사실상 과업기간의 변경이 불가피한 경우에는 감독 공무원의 검토를 거쳐 기간을 연장할 수 있다.

5) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주청의 승인을 얻어 용역 기간을 변경할 수 있다.

가) 추가 과업, 특별 업무수행, 조사물량 증가 등으로 용역기간 연장이 불가피 한 때

나) 천재지변, 일기불순 등으로 예측치 못한 작업일수가 계속될 때

다) 발주청의 사정으로 작업중지 또는 연장의 필요가 있을 때

라) 기타 부득이한 사정으로 연장이 불가피하다고 발주청에서 인정할 때

마) 용역을 수행할 수 없는 기간에는 발주청에서 설계자에게 통보하고 통보된  날부터 용역기간에 산입하지 아니한다.

6) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 인허가 업무 관련자료의 제출(공사중 발생된 공법 등 기술적인 검토사항)과 설계미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 수행한다.

7) 설계용역 완료 후 설계자의 설계의도 구현을 위한 용역을 계약하여 공사기간 중 설계의도가 제대로 구현될 수 있도록 할 수 있다.

4. 적용법규 및 기준

본 용역을 수행함에 있어서는 관계법규와 설계기준 및 용역 과업지침서에 합당하여야 하며 본 지침서에 의문이 있을 때에는 발주청과 협의하여 합리적인 과업을 수행하여야 한다.

5. 과업의 내용

가. 본 과업지시서는『장곳항 어촌스테이션 조성사업 건축설계 용역』(간이)공모에 적용한다.

나. 과업의 범위

1) 기본 및 실시설계 등 제반사항 설계

2) 건축공사의 계획, 중간 및 실시설계도서 작성(건축, 토목(조경), 전기, 기계,통신, 소방 등 해당 분야 모두 포함)

3) 각종 협의, 심의, 인증 및 영향성 평가(검토) 자료 작성

4) 설계상 필요한 조사, 검사, 진단, 시험 및 현황 파악 등을 위한 업무

5) 설계 등을 위한 인․허가 관련심의, 협의 등의 제반 업무수행

6) 작성설계도서

가) 본 설계의 범위는 건축공사, 토목공사, 기계설비공사, 전기공사, 정보통신설비공사, 조경공사, 소방설비공사, 기타부대 시설공사 설계도서

나) 건물배치 및 동선 조정 등에 의한 토공사 및 휀스 설치공사 설계도서

다) 기타 본 사업을 위하여 외곽간선에서 인입이 필요한 도로, 상하수도, 가스, 전기, 정보통신설비 등의 연결공사 설계도서

6. 과업시행 방법 및 준수사항

가. 설계용역자의 성실 등의 의무

1) 설계용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 건축물 및 관련시설의 미관, 에너지절약, 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고 본 과업의 질적 향상에 노력하여야 한다.

2) 계약체결 후 과업 착수 전에 착수계․사업수행계획표․용역수행자 명단 및 이력서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 발주청에 제출하여야 한다.

나. 보안 등

1) 설계용역자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 등 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 지식을 개인 또는 특정 단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안되며, 과업폐기물은 폐기처리를 원칙으로 한다. 또한 과업 수행시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계용역자가 진다.

다. 업무수행

1) 관련부서 협의 충실

가) 설계용역자는 본 과업을 수행함에 있어 사전 관련부서(협의부서 및 각 분야별 공사감독 등)와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.

※ 협의 및 요구시 협의록을 작성, 발주청에 제출하여야 한다.

나) 건축 부분 설계자와 전기․정보통신 부분 설계자간 설계도서 작성에 있어서 상호간의 의견일치가 되지 않는 사항이 발생할 경우 발주청과 협의하여야 하며, 설계에 필요한 자료를 협의하여 각종 자료를 제공받아 제안자간의 의견을 충분히 반영하여 설계하여야 한다.

다) 발주청에서 의견의 협의를 위하여 회의를 소집할 경우 소집에 응하여 의견을 제시하여야 한다.

2) 설계자료 조사 성실

설계용역자는 설계 등을 진행함에 있어 충분한 자료를 수집하여 설계의 질을 높여야 하며, 안전하고 경제적이며 에너지 절약형의 최신시설이 되도록 한다.

또한, 효율적인 실내 공간 구성을 위해 발주처와 실 사용자(어촌계 및 주민 등)의 의견이 반영될 수 있도록 협의한다.

3) 회의 참석 등

설계용역자는 본 과업과 관련된 해당 심의(자문)위원회 개최 및 발주청의 요구가 있을 시 참석․설명하고, 각 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변토록 하여야 한다.

4) 기술자문

설계용역자는 본 과업과 관련, 발주청의 요구가 있을 시 전문기관(대학, 연구소 등)에 기술 검토를 의뢰하여야 한다. 소요경비는 용역자가 부담하여야 한다.

5) 각종 보고 등 성실의무

가) 설계용역자는 아래 사항에 대하여 일반적인 사항 또는 당초 계획과 변경이 있을 경우 사전보고 한 후 검토된 자료에 의거 과업을 진행한다.

(1) 기술인력 구성에 관한 사항

(2) 설계자료 또는 통계 조사연구 적용 및 개선 등에 관한 사항

(3) 새로운 기술도입에 관한 사항

(4) 공사비, 공사기간 등

(5) 설계용역과 관련된 홍보활동 및 간행물 발간 등

(6) 기타 발주청으로부터 지시받은 사항

나) 발주청이 본 과업 진행상 필요하다고 인정할 경우 관계전문가 및 관계  기관의 자문을 들어야 한다.

6) 자료제출 성실

설계용역자는 과업수행중 심의(자문)위원회 등을 위하여 자료제출 요구가 있을시 이에 응하여 제출하여야 하며, 지적사항이 있을 때에는 설계용역자가 보완하여 납품하고, 자료제출 등으로 인한 비용은 용역자 부담으로 한다.

7) 설계용역자는 설계 전 반드시 용역감독관과 같이 현장 확인하여 각종 인입위치, 냉․난방부하 분석 등 현장 여건 등을 충분히 검토하여 설계에 반영한다.

라. 관계사항 숙지의무

1) 설계용역자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 사항에 대하여는 설계용역자가 책임을 진다.

2) 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주청과 협의 하여야 하며, 이견이 있을 경우 감독관의 의견에 따른다.

3) 기타 경미한 사항은 협의하여 시행하며, 이에 소요되는 비용은 설계용역자가 부담한다.

4) 본 과업지시서는 과업수행을 위한 사항을 규정하였는 바 이에 규정되지 아니한 사항은 관련법규의 규정, 건설공사 조사 및 시험 규정, 한국공업 규격 및 관련 규정에 따라 감독관과 협의하여 수행한다.

5) 본 과업을 수행함에 있어 설계용역자는 제반 여건조치를 하여야 하며, 본 과업으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 설계용역자가 손실 보상을 하여야 한다.

6) 설계용역자는 건축협의 등 각종 행정 절차상의 승인, 협의, 인․허가를 완료할 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하며, 필요시 관계기관의 협의에 따른 필요한 관련 자료를 작성 제출하여야 하며, 납품 후라도 행정절차 이행이 완료되어야 본 용역 과업이 완료된 것으로 본다.

7) 용역자는 납품후라도 설계 또는 오류 및 보완되어야 할 사항은 용역자 부담으로 책임지고 설계보완 하여야 하며, 또한 본 공사 시공중에 발생하는 제반사항에 대한 설계내용을 자문할 경우 적극 응해야 한다.

8) 과업 수행중 설계용역자의 고용인이나 하도급자가 과업수행에 부적당하다고 감독관이 인정할 때는 교체를 요구할 수 있으며, 용역자는 즉시 이를 교체하여야 한다.

9) 설계도서 작성은 국토교통부고시 제2024-907호(2024.12.31)의 설계도서 작성기준에 의하여 작성하여야 하며 설계도면에 설계자, 책임기술자 등의 설계도서 작성자가 실명날인 하여야 한다.

10) 본 과업 수행상 발주청의 사정에 의하여 일부 변경이 있을 때는 발주청의 방침에 따라야 한다.

11) 건축평면도 작성지연으로 인한 기계설비 설계 용역기간 축소가 되지 않도록 하여야 하며, 이로 인한 책임은 계약자에게 있으며 해당분야 감독관과 충분히 협의하여야 한다.

12) 본 용역설계에 의하여 공사시행 중 주요사항이 누락되었거나, 설계자의 귀책 사유로 설계변경을 하여야 하거나 용역설계로 인한 피해가 발생될 시는 설계용역자가 피해보상을 하거나 변경설계를 이행하여야 하며 이에 따른 대가를 요구할 수 없다.

마. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계용역자는 성과품 납품 후에라도 시공시 관계자 합동회의, 각종 도면요구 등 발주청의 자문에 성실히 응하여야 하며 과업수행 서류에 위 내용을 포함한다.

2) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 설계변경 등 모든 사항에 대하여는 관계법령에 따라 설계자가 일체의 책임(배상)을 져야 한다.(건축법 제72조 제8항 및 동법 시행령 제108조 제3항에 따른 설계자의 업무)

바. 변경 및 정산

1) 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고  인정할 때에는 설계용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 설계용역자는 발주청의 방침에 따라야 한다.

2) 발주청의 요구에 의하여 과업 범위의 증감이 발생할 경우 예산의 범위 내에서 당해 계약금액을 조정 또는 정산한다. 과업범위의 현저한 변경 없이 계획, 중간 및 실시설계 결과 과업제시기준 공사비를 초과한 범위에 대하여는 용역비의 증액 지급이 불가하다.

7. 설계용역 일반사항

가. 발주기관 및 연락처

1) 발주청 : 강화군청(해양수산과)

2) 주  소 : 강화군 강화읍 강화대로 394

3) 연락처 : 032-930-3842

나. 설계용역의 정의

본 설계용역의 최종도면은「건축법」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「지적법」,「도로법」,「문화재보호법」등 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없이(관계기관과의 건축협의, 소방협의 등 포함) 완료된 것이어야 한다.

다. 납품

납품은 최종 실시설계로 한다. 다만, 설계용역 기간 등에 따라 납품회수와 납품도서 작성방법, 부수는 당해 용역 설계지침에서 정하는 바에 따르거나, 발주청과 협의한다.

라. 관계기술자 협력

「건축법시행령」제91조의3(관계기술자와의 협력)과「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

마. 설계의 기본방향 및 개요

1) 지역의 특성을 상징하는 이미지 반영

가) 지역의 문화적 특성 및 지역적인 특성을 반영하여 정체성을 확보할 수 있는 건축 계획

나) 지역의 특성을 반영하는 랜드마크(Landmark)적인 요소를 설계에 반영하여 상징성을 가질 수 있도록 계획

다) 주변 여건을 고려한 적합한 외관을 갖춘 건축물이 되도록 설계

2) 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

가) 부지 주변의 조망을 고려한 배치

나) 제시된 대지의 주변 현황을 고려하여 안정성 있고 조화롭게 설계

다) 터파기 시 인접 건축물에 대한 위해요소 해소방안 마련 설계

라) 하수, 도로 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계

마) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계

바) 부지 내 접근성과 인지성, 사용성을 감안한 적정한 배치

3) 주변 교통영향 분석을 통한 합리적인 진․출입 동선 및 주차계획

가) 주변 주요동선과 연결되어 통행이 용이하도록 계획

나) 접근로의 교통량, 이용자 추이 분석, 법정 부설주차장 이외의 향후 주차장 증설 방안, 적정 위치 및 규모, 개략 공사비, 동선 흐름도 등

4) 시설 및 사무실의 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

가) 성장과 변화를 예측한 합리적인 규모로 외관은 조형성이 가미된 독창성 있는 설계로 쾌적한 사무환경 조성

나) 전화 및 LAN 구축으로 충분한 통신회선 반영

다) 내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변과 조화롭게 설계

라) 인근에 소음원이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계

마) 전기 및 정보통신 분야(특히 LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

바) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

5) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) 창호, 내외벽, 스라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계

(1) 건축물의 에너지절약 설계기준 (국토교통부고시 제2024-1026호)에 적합한 설계

(2) 인천광역시 녹색건축물 설계기준 (인천광역시 고시 제2024-247호)에 적합한 설계

나) 전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재 사용 및 고효율 시스템 설계

다) 열손실이 적으며 에너지 효율의 극대화를 이룰 수 있는 설계

라) 이용객의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

마) 신․재생에너지 사용 적정성 검토

6) 환경 친화적 부지환경 조성

가) 합리적인 토지 이용으로 쾌적한 환경 조성

나) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타

시설은 환경 친화적으로 설계

다) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

(1) 「소음․진동관리법」제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음∙방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치기준 등)에 맞게 설계

7) 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이하도록 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

다) 외부 마감재료는 내후성과 내오염성이 우수한 재료를 사용하여야 하며, 내부 마감재료는 고급스럽고 교체주기가 긴 재료를 사용하여야 한다.

8) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 활하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

나) 지반조사보고서의 결과에 의거 인근 주택가에 피해를 최소화하는 합리적인 기초계획이 이루어진 설계

바. 공사비 산출

『지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령(행정자치부 예규 374호)』에 의거 공사비 개략계산은 신빙성 있는 자료를 근거로 하여 실제 소요공사비의 근사치가 되어야 하며, 공사비 산출은 아래와 같은 규정이 정해져 있는 것은 그 규정에 따르고 그렇지 못한 것은 관련 계산 근거 및 자료를 함께 제출하여야 한다.

1) 공사비 계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙의 공사원가 계산 및 실적공사비에 의해 작성하여야 한다.

2) 공사비 적산은 표준품셈, 시중노임단가, 적산기준 및 실적공사비 등에 의거 산출한다.

3) 특수공정은 제조원가 계산서 양식에 따른 서식으로 2개소 이상의 견적서를 받아 합리적인 단가를 택한다.

4) 제조원가에 의할 수 없는 공정의 단가는 전문가의 견적단가로 계산한다.

8. 발주청과 수급인의 책임 및 의무

가. 설계의 목표와 추진절차

1) 수급인은 건설공사의 시행과정에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 수급인은 합리적인 설계를 추진하기 위해 용역착수 시 계약에 의거 발주청이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구조건들을 판단하고 결정하여 설계요구조건을 작성하여 발주청의 승인을 받아야 한다.

3) 수급인은 발주청의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

4) 수급인은 건축과 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

5) 설계는 관련법규와 계약조건, 발주청과 협의된 기본설계조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 수급인은 발주청에 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, 발주청과 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.

6) 수급인은 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주청에 보고한다.

7) 수급인은 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상황을 준수하여야 하며, 모든 설계도서에 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

8) 수급인은 계약 체결 시와 설계용역 착수 시 그리고 설계 도서를 완성하여 제출할 때는 반드시 대지를 확인하여 계약 및 설계도서와 다른 점이 발생되지 않도록 한다. 대지의 조건에 중요한 변경이 발생되었을 때는 발주청에 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

9) 수급인은 설계 추진과정에서 건축, 토목, 기계, 전기, 통신 등 각 공종별로 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용에 상이함이 없도록 만전을 기하여야 한다.

10) 수급인은 용역 종료 후 공사 진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주청이 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 지체 없이 이를 이행하여야 하며 그에 따르는 비용을 요구할 수 없다.

11) 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 분쟁기간 중이라 할지라도 수급인은 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니된다.

나. 공정계획

1) 수급인은 설계용역의 공정에 대하여 공정표를 작성하고 발주청에 제출하여 승인을 받거나 발주청이 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안한다.

2) 공정은 모든 일정이 작성되어야 하고 수급인은 발주청이 동의한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

3) 공정계획은 용역착수 시 뿐만 아니라 용역수행 과정에서도 항상 재검토 되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

다. 보안

1) 업무내용의 비공개

수급인은 발주청과 업무수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주청의 승인 없이 이를 공개해서는 아니된다.

2) 성과품은 발주청에 최초 제출

수급인이 작성한 발주청과 관련한 모든 성과품은 이를 공개, 공모 또는 다른 행위를 시작하기에 앞서 발주청에 최초로 제출하여야 한다.

3) 검토 및 승인창구 단일화와 절차 체계화

수급인과 발주청의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인창구는 단일화 되어야 하고, 절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안유지가 용이하도록 하여야 한다.

라. 계약서와의 관계

1) 발주청과 수급인은 계약내용의 이행에 상호책임을 진다.

2) 발주청의 승인으로 업무내용 변경 시 계약 변경

가) 발주청은 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 수급인은 발주청의 승인이 없는 한 계약을 위반할 수 없다.

나) 과업내용의 변경은 발주청과 수급인이 문서화하여 상호 승인을 하여야 하고 이는 계약변경의 근거서류가 된다.

다) 계약서 및 본 과업 내용서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 발주청과 수급인이  상호 협의하여 결정하기로 하며, 이때 업무내용의 변경이 발생할 때는 “나)”항에 따른다.

마. 공사비와 예산

1) 수급인은 용역수행 시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 발주청과 협의하여 적정 공사비의 산출 및 관리에 노력해야 한다.

2) 특히 환경 친화적 설계에 따른 추가공사비용에 대하여는 과업 착수 단계부터 소요 예산의 증감사항 및 적절성에 발주청과 수시로 협의하여 발주청의 승인을 득한 후 후속공정을 진행하여야 한다.

3) 개산견적과 별도로 상세견적은 계약서에 의한다. 수급인은 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

4) 신축 위치에 있는 모든 토목공사(옹벽공사 등)에 소요되는 비용도 함께 포함 되어야 한다.

바. 과업 변경

1) 본 과업수행 상 정부의 상위계획 변경 또는 발주청 사정으로 인하여 과업시행  범위가 변경될 수 있으며, 이 경우 발주청 방침에 따라야 한다.

2) 과업변경 요인이 발생될 경우나 계약체결 후 예정가격 또는 계약결정금액에 하자 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액의 감액사유가 발생하였을 때는 해당 금액을 당초 금액에서 감액 환산 조치함에 동의하여야 한다.

3) 수급자는 과업 준공 이후라도 변동사항이나 보완사항이 있어 관련서류(도서)와 현장 확인을 요구할 때에는 적극 협조하여야 한다.

제2장 설계 진행사항

1. 설계도서 작성

설계도서의 작성 방법은 발주청이 정하는 소정 양식에 의하고, 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 발주청과 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 신축 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2. 설계진행시 제출서류

설계자는 설계진행 시 다음 서류를 제출하여야 한다.

가. 착수시 : 계약 후 5일 이내 착수한다. 설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류(이하“착수계”라 한다.)를 2부 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 기술용역 투입 일정표

3) 설계용역 예정공정표(계획, 중간 및 실시설계의 납품예정일자 명시)

4) 인력 및 장비투입계획서

5) 분야별 참여기술자 보안각서

6) 분야별 책임기술자 선임계

7) 설계용역수행 조직표(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함, 연락처 기재)

8) 각 공종(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신 등)의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 등

9) 건설기술인협회 등 공인기관에서 발행하는 경력증명서 첨부

10) 낙찰(계약)금액에 의한 산출내역서

11) 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 기술용역 공정예정표상의 완료일 이전에 다음 서류를 제출한다.

1) 기본․실시설계 검사원

2) 건축법 및 과업지시서 등 제반법규 검토서

3) 건축협의(인허가)에 필요한 각종 서류

4) 각종 심의에 필요한 서류 등

다. 실시설계 제출 시

1) 실시설계 작성방법에 따라 실시설계도서에 대하여 지침에서 정한 사항

2) 실시설계설명서

3) 기타 발주자가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

라. 업무협의 및 공정보고

1) 수급인은 착수계 제출 후 3일 이내에 착수계 내용, 책임기술자의 적합성,  하도급의 적정성 등에 대한 협의한다.

2) 수급인은 다음과 같은 경우 업무협의를 하고 협의결과 보고서를 작성 보고 한다.

가) 조사 및 자료수집 완료 시

나) 기존 설계 완료 시

다) 공법 및 각종 시스템 결정 시, 주요자재 선정 시

라) 기본, 실시설계 검사원 제출 전․후

마) 기타 발주청이 필요 시

3) 수급인은 다음과 같이 과업수행계획서의 예정공정표를 기준으로 공정보고서(용역수행 대표자명의)를 작성하고, 발주청에게 보고하고, 각 보고의 시기는 발주처와 협의하여 조율한다.

가) 본 설계안 및 추진계획 보고 - 착수일로부터 15일 이내

나) 기본설계완료 보고 - 착수일로부터 30일 이내(기본설계완료 10일 전)

다) 공정보고

- 월간공정보고 : 매월 마지막 주에는 월간보고서를 작성하여 제출

라) 수시보고 : 발주청의 요청 시 수급인은 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

마) 실시설계 종합보고 : 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고, 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야하며, 관리 운영에 관한 사항과 각실 면적 및 기능과 시설개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 하여야 한다.

(1) 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 되며 다음 사항을 수록하여야 한다.

㉮ 과업의 목적

㉯ 과업의 범위

㉰ 과업의 내용

㉱ 사전 조사내용 요약

㉲ 설계기준

㉳ 구조물 설계안별 검토 내용

㉴ 세부설계 내용(공종별 비교검토 내역 포함)

㉵ 주요자재 및 수급계획

㉶ 시공계획

㉷ 도면첨부

㉸ 기타 참고자료

㉹ 기타 발주청의 요구사항

바) 최종보고 : 납품 10일 전에 최종도면 및 내역서를 감독관의 검토를 받은 후 보고(검토 날인이 없는 것은 인정치 않음)

3. 업무 회의

가. 일반사항

1) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대해 발주청과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

2) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

3) 본 설계지침서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주청의 승인을 받아 채택할 수 있다.

4) 발주청은 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출․요구하여 수정․보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

5) 설계자는 자문회의 등 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

나. 업무 착수회의

1) 업무 착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일 또는 착수계 제출 후 발주처와 협의를 통하여 개최한다.

2) 업무 착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

다. 수시 회의

1) 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획, 중간 및 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 하며 보고회의는 상호간 일시와 장소를 협의하여 개최한다.

2) 계획 및 중간설계 과정에 있어서는 최정안이 확정되기 까지 발주청의 협의 요구(회의 횟수, 시기 등)에 적극적으로 협조하여 최상안이 확정(반영)되어야 한다.

※ 업무협의 및 회의 발의자는 개최일 3일 전, 모든 참석자에게 시간, 장소, 참석범위, 안건, 기타 필요한 정보를 전달한다.

4. 사용 자재

가. 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 국내에서 생산된 제품, KS제품과 고효율(에너지절약, 절수) 인증제품, 조달청 우수제품, 소방산업기술원에서 검증․인증된 제품을 우선적으로 사용함을 원칙으로 한다.

나. 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하며, 외국산 자재의 사용은 가급적 피하는것을 원칙으로 하고, 설계자의 설계의도를 구현하기 위하여 불가피한 경우 발주청과 협의를 통해 외국산 자재를 사용할 수 있다.

다. 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 안 된다.

5. 관련기관 인·허가 협조

가. 수급인은 본 과업과 관련하여 관련법규에 의한 협의․허가 및 발주기관의 심사 결과를 반영한 설계 도서를 작성 제출하여야 하며, 이와 관련된 일체의 비용은 수급인의 부담으로 한다.

나. 수급인은 과업수행 전 부지 내･외 지하 지장물의 매설여부(도시가스관, 상･하수도관, 기타) 및 전력공급 가능여부, 상수도 공급가능여부, 도시가스 공급 가능여부 등을 수급인의 책임 하에 관련기관(부서)과 협의한 후 설계에 반영하여야 한다.

6. 하도급의 범위

수급인은 도급 받은 설계용역 전체를 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수

없으며, 하도급 시 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제6조(하도급 승인)에 따라

발주청의 승인을 받아야 한다.(단 수급인은 하도급 된 당해 업무에 대하여 모든 책임을 진다)

7. 각종 조사 및 자료수집

가. 현지답사

1) 수급인은 현지를 답사하여 계획한 시설물이 현지조건에 적합한지의 여부를 확인하여야 한다.

2) 또한 지형, 지질, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사용 도로, 공사부지, 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.

나. 측량조사

1) 측량은 측량법과 공공측량 작업규정에 관한 기준에 의거 시행하여야 한다.

2) 발주청에서 설계 계약전에 제공하는 경계복원, 지적현황 측량을 참고하여 작성 한다.

다. 지장물 조사

1) 계획 구간 내 각종 지하 매설물 및 지상 시설물을 정확히 조사하여 설계에 반영하도록 한다.

2) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상수도관, 하수도관, 가로수, 간판 등)은 해당 기관과 협의하여 이설비 또는 대체시설비를 산출하여 사업비에 반영하여야 한다.

3) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 상의하고 적절한 보호방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

라. 구조물 조사

계획대지 부근의 기존 건물을 비롯한 각종 구조물 현황 등을 조사한다.

마. 용지조사

1) 본 과업에 따른 각종 법규 및 인․허가사항을 조사하여 기재한다.

2) 계획구간 내의 도시계획 현황과 토지이용계획 등을 조사하여 검토한다.

3) 민원 발생 예정지역 및 협의 사항을 조사 검토한다.

바. 관련계획 자료 조사

1) 기 조사된 자료가 있는 경우에는 조사된 내용을 요약하여 기재한다.

2) 기 조사된 자료가 있으나 충분치 못한 경우에는 추가 조사범위, 조사물량 등 필요한 조사내용을 기재한다.

3) 각 조사항목별 조사방법, 조사범위, 조사물량 등을 작성한다.

4) 본 건축물이 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

사. 기 타

1) 과업수행에 있어서 과업지시서의 해석 등에 대하여 계약 양방간의 의견이 상이할 때는 상호 협의하되, 상호 협의가 이루어지지 않을 경우에는 관련회계 법규에 따른다.

2) 본 용역성과 최종안을 작성 감독관의 검토를 받아 완성한다.

3) 본 과업의 완료는 인천광역시에서 실시하는 계약심사 결과에 따른 과업수정 결과에 대한 발주청의 승인을 득함으로써 과업이 종료된다.

4) 과업 기간 중에도 발주청과 협의를 지속적으로 하여야 하며, 협의 결과 및 보완사항 발생 시 이를 보완 하여야 한다.

5) 본 과업수행 중 책임기술자 및 각 분야의 기술자 교체 시는 반드시 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

6) 수급자는 과업수행과 관련된 제반업무 수행시 안전상의 문제가 발생하지 않도록 항상 안전교육을 하여야 하며, 안전사고 발생에 대한 책임은 수급자에게 있다.

제3장 일반지침

1. 기본 방향

(1) 부지 조건을 고려하여 마을공동 직판장과 수산물 저장 및 포장창고의 기능을 최대화할 수 있도록 한다.

(2) 주로 차량을 이용한 접근으로 주차공간(39대 이상)을 확보하며, 보차분리를 통해 보행자의 안전을 고려한다.

(3) 주변 건물 및 여건을 고려한 배치 및 외부 공간계획을 수립한다.

(4) 토지 및 시설물 등 규모의 확장 가능성을 감안한 설계로 한다.

(5) 해안가 주변 자연환경을 지키는 취지를 가지고 계획하며, 주변 경관과의 조화, 문화자원과의 연계, 지역 정체성을 고려한 설계를 계획한다.

(6) 총 공사비는 부가가치세를 포함하여 추정공사비 이내로 계획해야 하며, 반드시 개략 공사비 등을 주 공종별로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 공모안을 제출하여야 한다.

(7) 어촌스테이션과 별동 창고 총 2동의 건축물을 계획한다.

2. 적용 기준

가. 본 과업지시서는「장곳항 어촌신활력증진사업(유형2) 건축설계 용역」에 필요한 기본적인 요구조건을 제시한 것이므로 설계자는 과업지시서에 명기된 기준 이상의 성능 및 재질과 공법을 적용한 설계를 하여야 하며, 발주청이 요구한 소요시설 외에 품질과 기능이 향상되는 시설은 설계자가 판단하여 설계에 반영할 수 있다.

※ 장곳항 어촌시활력증진사업(유형2) 공간환경 마스터플랜 자료를 제공받아 사업취지를 잘 이해하여, 향후 장소적 의미를 갖는 역할을 수행할 수 있는 공간으로 조성되도록 반영하고 새로운 아이디어를 제안할 수 있음

나. 과업지시서 등의 자료는 발주청에서 설계자의 편의를 도모하기 위하여 제시하는 것으로 설계자는 충분한 사전조사를 통해 설계에 반영하여야 한다. (사전조사에 소요되는 비용은 설계자의 부담으로 한다)

다. 설계자(수급인)는 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행상 발생한 모든 하자 등에따른 책임(민․형사상)은 수급인(설계용역자)이 진다. 수급인은 용역준공 후에도 이러한 사항에 대하여 발주청의 수정․보완 요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 시정․조치하여야 한다.

라. 특수자재, 공법의 적용으로 부득이 본 설계지침에 명시한 대로 설계할 수 없는 경우 설계 설명서(기본설계)에 그 적용부위, 자재, 공법의 명칭과 공인 기관의 기술검토서 및 시험데이터 등 적용부위에 적합한 자재, 공법임을 인정할 수 있는 성능관련 입증 자료를 명시하여야 하며, 시방서(실시설계 도서)에 그 품질규격 및 시공방법 등이 명시되어야 한다. 이때 입증하여야 할 성능 명목은 KSF 1010(건축물에 영향을 주는 각 요인의 성능분류)에 따른다.

마. 본 시설은 기본목적에 맞게 설계되어야 한다. 아울러 설계는 공사의 능률성과 경제성이 제고될 수 있는 기법으로 시행되어야 하며, 특히 시공에 있어서는 신공법 및 기술개발에도 기여할 수 있는 기법으로 하고 준공 후 유지관리 측면을 고려하여야 한다.

바. 본 시설의 설계기준은 관계법규․규정․지침․고시․조례․KS규격 및 국토교통부 등 정부기관에서 제정한 관련 표준시방서와 관련 설계기준, 본 도서작성지침 및 설계지침이 정하는 기준 이상으로 하며 서로 상이한 경우에는 강화된 기준 이상으로 한다. 납품일 이전에 관계법규 등의 내용이 변경된 경우에는 변경된 내용에 따라야 한다.

사. 본 과업지시서에 본 시설의 기본적 기능 및 관리상 필요한 사항임에도 불구하고 누락된 경우에는 설계에 반영하여야 한다.

아. 본 과업지시서의 내용 및 기본계획에 대한 변경 또한 수정을 요할 경우, 이에 부수되는 모든 사항은 발주청의 승인을 득하여야 한다.

자. 건축, 토목, 설비, 전기, 통신 및 조경 등 부대시설에 대한 설계기준은 관련 법규와 제반기준 및 설계지침서에 의한다.

차. 본 공사의 설계서 및 내역서 등은 조달청 계약발주가 가능하도록 작성한다.

3. 건축 세부지침

3.1 배치 및 동선계획

가. 해안에 접한 장곳항 친수공간 조성에 따른 바다전망이 확보되도록 배치한다.

나. 북측 산비탈면으로 낙석 위험이 있어 낙석위험을 최소화 하기위해 북측산과 건축물은 충분한 이격을 한다.

다. 보차분리로 보행자의 안전을 확보하고, 이용자(주민, 관광객, 작업자 등)별 동선을 고려하여 계획한다.

라. 주차공간은 39대 이상 확보하며 하역작업, 창고작업을 위한 주차공간을 계획한다.

마. 장곳항 친수공간(예정사업)을 고려한 건축물 배치 및 동선계획을 한다.

바. 근무자의 쾌적한 근무환경을 배려하고 내ㆍ외부 공간과 유기적으로 연계될 수 있는 적절한  휴게 공간 및 녹지를 계획하여야 한다.

사. 접근이 용이한 곳에 시민휴게공간 조성을 고려하되, 지상1층에 계획이 어려울 경우 옥상등의 공간을 활용할 수 있으며 외부인의 접근성과 시간제 개방 등 시설 운영과 보안을 고려하여 계획하여야 한다.

아. 직판장인 어촌스테이션과 어촌계원들의 작업공간인 별동창고는 사용성을 고려하여 배치한다.

3.2 평면계획

◆ 어촌스테이션

가. 교육장, 휴게실을 유기적으로 배치하여 이용자들이 편리하게 사용할 수 있도록 상호 연결성을 고려하여 배치하고, 다양하게 이용할 수 있도록 유연하게 계획한다.

나. 각 공간을 획일화하지 않고 공간별로 용도에 맞게 계획한다.

다. 불특정 다수인이 이용하는 공간으로 안전사고를 고려하여 계획한다.

라. 지역 주민 및 관광객이 자유롭게 이용할 수 있도록 계획한다.

마. 추후 서측면에 조성될 장곳항 친수공간 부지를 고려하여 계획한다.

◆ 수산물 저장 및 포장창고 (별동 창고)

가. 주민 의견수렴을 통한 공동 어업공간으로 지역 어업활동의 결과물을 세척 및 포장하는 공간이다. 충분한 작업공간, 하역공간 확보와 지게차 등을 이용할 수 있는 계획(층고, 출입문 등)을 반영하고, 화재에 적합한 재료를 반영한다.

나. 지역 주민인 어촌계원들이 자유롭게 이용할 수 있도록 계획한다.

3.3 입면계획

가. 바다와 인접한 곳에 조성될 직판장 건물에 마을 분위기를 변화시킬 수 있는 입면 파사드와 호감을 줄 수 있는 세련되고 상징성 있는 외관을 계획한다.

나. 건물의 외관은 주변환경과 조화되고 친밀한 느낌을 줄 수 있도록 계획한다.

다. 역사문화환경 보전지역의 특색을 고려한 외관계획으로 지역 정체성을 확보하도록 계획한다.

라. 직판장은 친수공간과 연계될 수 있는 개방형 공간이 되도록 입면 및 평면계획에 반영한다.

마. 에너지의 효율성 및 유지ㆍ관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다.

바. 과도한 원색사용은 지양한다.

3.4 단면계획

가. 동별 배치, 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

나. 조닝(Zoning)을 통해 기능별 독립성을 유지하고, 관리 및 서비스 동선은 상호유기적인 연결이 가능하도록 하며, 층간소음을 고려한 설계가 되도록 한다.

다. 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

3.5 주차계획

가. 주차장은 최소 39대 이상, 대형버스 주차장 확보와 동선을 고려하고 가능한 많은 주차면이 설치될 수 있도록 계획한다.

나. 주차장 출입구 계획 및 주차동선 계획 시 이용객의 안전을 최우선으로 고려하여야 하며, 교통 및 주차 흐름에 혼잡을 주지 않도록 설계에 반영한다.

다. 주차장은 주 진입도로와의 연결성을 우선적으로 고려하되, 이용객들의 보행출입 동선과는 분리하여 차량으로부터의 위험요소를 배제한다.

라. 주변 도로망 체계를 검토하여 본 건축물의 진출입 동선체계를 계획하고 합리적인 차량 진출입구가 설치되도록 한다.

마. 장애인 주차면은 건물 출입구와 가장 가까운 곳으로 배치하도록 계획하여야 한다.

바. 주차장 계획시 막다른 곳은 회차공간을 확보하여 원활한 주차가 가능하도록 계획하여야 한다.

사. 전기차 충전시설(완속1대, 급속1대)은 화재 등을 고려하여 소화작업이 용이한 공간에 설치한다.

아. 하역작업, 창고작업을 고려한 주차, 작업공간을 계획한다.

4. 기타 세부지침

가. 토지이용 계획

장래 발전가능성에 대처할 수 있는 장기적인 계획을 수립해야 하며 그 전제로서 동선 및 수용 규모를 미리 예측하여 미래의 상황에 따라 융통성 있게 계획

나. 동선 계획

동선 계획은 기능공간 배분에 설정된 시설공간을 체계적으로 연결 지어 시설 이용의 효율성을 도모

다. 시각적 형태

1) 건물의 층수 : 건물의 기능을 고려하며 주위환경과 스카이라인을 고려

2) 건물의 외형 : 주변환경과 조화될 수 있는 형태로 소방시설로서의 정체성을 인지할 수 있도록 설계

3) 건물의 층고 : 각 층의 용도에 따라 조정하며 구조에 따른 유효공간과  활동 내용에 따른 인체동작, 공간밀도에 따른 적정환경 및 경제성 고려

5. 부문별 설계지침

가. 건축 설계지침

1) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 각종 침하에 대한 우려가 없고 안전하여야 한다.

2) 방수, 타일 등 내․외장재가 기계시설 등에 의하여 파손되지 않도록 하며, 다목적실 등은 바닥 충격을 흡수할 수 있고, 방음시설 등으로 활동에 지장이 없도록 한다.

3) 친환경 소재를 사용하고 관련규정에 의한 검사에 합격한 재료를 사용한다.

4) 주차장 계획과 차량 진․출입 등 동선계획을 고려한다.

5) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능 하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

6) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계한다.

7) 장애인이 이용함에 있어 불편이 없도록 경사로 등 장애인 편의시설을 고려하여야 하고, 내외장 설계 시 인테리어 요소를 가미한 정교한 설계가 되도록 하여야 한다.

8) 제반 부수시설의 가구, 사인보드, 특수시설 및 기구 등은 그 종류, 필요위치, 소요개수 등을 면밀하게 분석 및 검토하여 실시설계에 반영할 수 있도록 충분한 계획 및 자료를 제시한다.

9) 건축물의 구조계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 하며, 방수재료 및 공법 선정은 주요자재 선정 검토서를 작성 제출한다.

10) 건축물의 지진재해를 방지할 수 있는 대책이 고려된 내진설계가 되도록 한다.

나. 구조 설계지침

1) 모든 구조계획 적용기준(구조기준의 최신 정부 제정 기준 / KBC2016, KCI2012)에 따라 일반적인 구조 해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

2) 각 구조부재는 최신 기준(건축구조기준 KBC2016, 콘크리트 구조기준 KCI2012) 을 준수하며, 그렇지 못할 경우 공인기관의 실험 및 해석에 의하여 안전성이 검증된 것이어야 한다.

3) 내진설계는 건축구조기준(KBC-2016)에 따른 지진하중에 적합하게 설계한다.

4) 대상부지의 지반조사를 실시하고 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조로 계획한다.

다. 토목 설계지침

1) 일반 사항

가) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

나) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하 구조물, 지하 매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

다) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도는 세분하여 작성한다.

2) 부지 정지공사

가) 기존 지형을 최대로 활용하고 주변지역 연결 등을 고려하여 정지계획을 수립한다.

나) 토량 발생을 최소화 하되, 사업대지 내에서 절․성토 균형을 유지하도록 설계한다.

다) 토량의 운반거리가 최소화 되게 하고 경제적인 설계가 되도록 한다.

라) 절토 시 발생되는 양호한 표토는 잔디 및 수목 식재 시 활용방안을 강구한다.

마) 대지 계획고 및 진입로 계획고 등을 감안하여 합리적인 계획고를 결정한다.

바) 법면 발생을 최소화하고 부득이한 경우를 제외하고 가급적 구조물 설치를 배제하도록 정지계획을 수립한다.

사) 암반 굴착면에 기초를 설치하는 경우에는 굴착면의 요철은 ± 10cm 이내로 정지하여야 하고, 그 이상이 되는 여굴부위는 빈배합 콘크리트 또는 Mass Concrete로 처리한다.

아) 굴착면의 이물질이나 부석(뜬돌)은 모두 제거하여 기초와 암반과의 부착을 양호하게 하여야 한다.

3) 상수도 공사

가) 용수 공급계획은 인천광역시 상수도 기본계획에 의하되, 발주청과 협의 후 인입지점을 결정한다.

나) 용수량은 현재는 물론 미래와 주변지역 급수계획을 고려하여 계획한다.

4) 하수도 공사

가) 환경부 제정 하수도 시설기준 및 인천광역시 하수도 정비 기본계획에 의하되, 기존 배수시설을 충분히 조사한 후, 우․오수량 추정과 배수방식 및 유량계산을 실시하고, 우수는 지구 외 유역을 정확히 파악하여 배제계획을 수립하여야 하며 유출부 단면이 부족함이 없는지 검토 및 반영한다.

나) 배수시설은 우․오수 분류식으로 계획하고, 우․오수 교차부분은 오수관로가 우수관로 보다 가급적 깊게 하고 동일경로로 계획하여 간선배수시설까지 분류식으로 연결하여야 한다.

다) 관거는 직선으로 부설하고 굴곡부는 예각 또는 직각 접합을 피하며 침하되지 않도록 설계한다.

라) 우수맨홀 뚜껑은 차도는 주철재 뚜껑을 사용하고 보도 및 녹지에는 보도포장재와 조화되는 재질의 뚜껑으로 하고, 오수맨홀의 경우에는 밀폐된 주철재 뚜껑을 사용한다.

마) 오수받이는 우수가 유입되지 않도록 밀폐된 뚜껑을 사용하여야 하며, 저부에는 하수의 흐름이 원활하게 되도록 invert를 설치한다.

바) 단일 굴착에 의한 우․오수관은 동시 시공이 가능토록 평면계획을 수립한다.

라. 기계설비 설계지침

1) 기본지침

가) 시설별 요구조건에 충족할 수 있는 방식을 채택하고 모든 자재는 건축물의 에너지 절약 설계기준에 의한 에너지 절약형 자재를 우선적으로 선정한다.

나) 건축, 전기 등 관련된 타 기술분야의 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구성요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

다) 보수, 유지관리가 용이하여야 하고, 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

라) 냉․난방, 위생, 환기 기타 모든 공급처리 시설은 최신의 시설 방식을 원칙으로 하여 소수 인원으로 운전이 가능하도록 그 효율을 극대화하고 유지ㆍ관리비용을 최소화 한다.

마) 건축시설별 운영계획(사용시간, 사용요일 등)을 고려한 설비를 구성한다.

2) 냉․난방설비

가) 에너지이용합리화법을 적용 안전하고 경제성을 고려한 지역난방, 도시가스 등 냉․난방시스템을 계획한다.

나) 쾌적한 환경의 지속적인 유지 및 공간활용이 되도록 방열기구를 선정한다.

다) 실내 공기질의 청정화 및 쾌적성이 보장되는 외기 환기 횟수 및 공기정화 계획을 수립한다.

라) 동파 방지 및 결로 방지에 대한 대책을 강구하여 설계에 반영한다.

마) 소음과 진동을 줄일 수 있는 설계를 한다.

바) 실의 크기에 따른 적정용량의 냉․난방기 (천장 매립형 절전형 냉․난방기)를 각각 설치한다.

3) 급․배수 설비 및 위생설비

가) 양질의 급수를 위하여 직결급수 방식을 채택하고, 비상시를 대비한 저수조 시설은 협의하여 반영한다.

나) 안전급수를 위하여 위생설비, 급수설비 자재를 내식성 자재로 사용한다.

다) 수질오염, 적정 급수압, 부지내의 상수도 공급조건 등을 검토하여 직결급수방식, 고가수조방식과 가압급수방식의 경제성 및 장단점을 비교 선정한다.

라) 절수형 위생기구를 선정한다.

4) 환기설비

주방 및 정화조 환기는 제1종 환기방식에 의한 건물 최상층에 배기하도록 하고, 기타 실의 환기방식은 각 시설별로 합리적으로 채택, 자연환기를 동시에 감안하여 특성에 따라 적정방식을 선정한다.

5) 소방설비

소방관련 법령 및 시행규칙, 소방기술기준에 관한 규칙에 적법하게 설계한다.

6) 가스설비

가) 필요한 곳에 적절히 공급될 수 있도록 도시가스사업법에 적합하게 채택한다.

나) 자동가스차단 경보기 설치를 계획한다.

7) 기타사항

가) 출입이 빈번한 기계실 천정, 배관 피트 등은 점검 및 유지보수가 쉽게 이루어질 수 있도록 충분한 공간을 확보한다.

나) 지하 매설관을 공동구에 설치하지 않을 경우 침하나 부식을 방지할 수 있는 방법을 채택한다.

다) 장애인․노인․임산부 등 편의 증진에 관한 법령에 적합하게 계획한다.

마. 전기설비 설계지침

1) 수변전설비

가) 전력수급 지점은 사전에 현장을 충분히 조사ㆍ확인 후 해당기관인 한국전력공사와 협의하여 결정한다.

나) 피뢰설비와 접지설비는 관련법규 및 규정에 적합하게 계획한다.

다) 한전수탁공사비, 한국전기안전공사의 사용전 검사 수수료 등을 설계에 반영한다.

라) 상용 전원이 정전되었을 경우 비상용 축전지설비가 가동되어 화재출동 방송 및 화재출동에 관련된 시설은 중간 전원으로써 적절한 용량의 축전지를 설치한다.

2) 전력간선설비

가) 각층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점에 설치한다.

나) 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락시 허용전류 등을 고려하여 결정한다.

다) 간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비 증설을 고려하여 간선의 구성 및 용량을 결정하되, 관리자 주체 실별분리를 위하여 간선분리를 구성한다.

라) 배전전압은 3상 4선식 380V/220V로 계획하고 간선의 길이는 가급적 최단거리가 되도록 하며, 분기회로의 부분에 누전차단기를 설치한다.

3) 동력설비

가) 동력제어반과 각 기기의 평면배치 및 조화성을 고려한다.

나) 진동하는 기기의 배관에는 가요전선관을 사용한다.

다) 동력배관과 설비배관의 증기 및 고열에 대한 배관 이격거리를 고려하여 설계한다.

라) 제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분토록 고려한다.

마) 공기호흡기 충전기 장비 등의 사용 전원방식 및 용량을 사전 조사하여 설계에 반영한다.

4) 전등설비

가) 건축물의 각 실별 용도에 적합한 광원과 등기구 종류가 각 실에 맞고, 눈의 피로 및 보호를 위한 적정조도(KSA3011)로 설계한다.

나) 에너지이용합리화법 제3조의 규정에 의한 고효율에너지 기자재(LED등 반영구적인 제품 등)를 사용한다.

다) 전등은 부분조명이 가능하도록 등기구수 6개 이내의 전등군으로 구분하여 전등군마다 점멸이 가능하도록 하되, 에너지 절약을 위하여 창과 가장 가까운 전등은 따로 점멸이 가능하도록 한다.

라) 매입 조명기구의 설치 위치에 타 설비 또는 덕트배관 등 장애물을 감안하여 건축 층고높이 설계 시 천정부분의 충분한 설치공간을 협의하여 확보 반영한다.

마) 가급적 조명기구 종류 수를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재 확보의 편의성을 고려한다.

바) 적절한 야간조명을 계획하여 소방차량 정비 및 안전한 보행 환경을 확보한다.

사) 옥외 보안등은 조경과 건축물 주변 여건 등 미관을 고려하여 설계한다.

5) 전열설비

가) 전열 1회로당 최대 수구수는 10개 이하로 설계하고 실별, 용도별로 구분한다.

나) 일반용 수구는 220V 접지형을 사용한다.

다) 수구부하의 용량은 150VA/EA로 하며 분기회로는 용량의 80%를 초과하지 않도록 한다.

라) 수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분 및 사용이 가능하게 분류한다.

6) 접지설비

가) 고감도 장비의 보호를 위하여 등전위 접지로 설계한다.

나) 건축물 용도에 적합한 접지구성 설비로 설계한다.

바. 정보통신 설계지침

1) 전화 및 교환설비, 인터폰설비

가) 구내 통신선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비를 구성하는 배관시설은 설치된 후 배관의 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 설치한다.

나) 구내 통신선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비는 그 구성과 운영에 있어 사업용 전기통신설비와의 접속이 용이하게 한다.

다) 구내 통신선로설비, 이동통신 구내 선로설비, 종합유선방송 구내 전송선로설비 등은 초고속정보통신망 및 종합유선방송망을 접속하기 위한 통신장비를 설치할 수 있도록 하여야 하며, 구체적인 설치 방법은 정보통신부장관의 고시를 따른다.

라) 구내 통신선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용, 구내 회선의 구성 및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보한다.

마) 예비 회선수를 20% 이상 확보할 것. 다만, 이를 수용할 수 있는 배관시설이 확보되는 경우에는 그러하지 아니하다.

바) 사무자동화 추세에 따른 각종 사무기기 설치를 고려하여 소요 회선 수 및 제반 시스템에 적합하도록 설계한다.

2) 방송설비

가) 일반방송(안내방송, BGM) 및 비상 시 화재수신반과 연동하여 비상방송이 가능하도록 계획한다.

나) 실별, 용도별 그룹구성 검토와 전관방송의 일반 방송기능과 비상발생 시 방송연계 기능이 가능하게 한다.

다) 스피커의 수량과 Amp의 용량은 충분하고 스피커의 배치를 적절하게 한다.

라) 비상방송을 겸한 방송설비의 스피커 배선은 HIV 1.6㎜ 이상의 전선을 사용한다.

마) 방송용 스피커는 반사음 및 반경을 구획하여 충분한 음량으로 한다.

3) 기타 설비

가) 낙뢰로부터 건물 인원 및 장비를 보호하기 위한 피뢰설비를 고려한다.

나) 모든 시설은 장래 확장(초기, 중기, 최종)에 대응할 수 있도록 각종 설비용량을 감안하여 설계한다.

다) 주차관제, 침입감지, CCTV, 출입통제 설비를 검토 반영한다.

사. 조경 설계지침

1) 토지이용 및 동선체계, 조경공간과 건물의 유기적 배치, 위치에 맞는 수목선정 및 식재에 관한 사항을 반영한다.

2) 수목식재는 식재지역의 기후, 토양 등을 비롯한 제반 생육환경 여건에 부합되도록 식재한다.

3) 식물재료는 현장주변의 자생종을 중심으로 선정하여 경관적․생태적 동질성을 확보하고 환경적응력을 양주토록 할 것이며, 배식계획 수립 또한 교목, 관목, 지피종 등 다층식생구조를 유지토록 한다.

4) 기타 시설 및 특기사항(유지관리지침 등)을 준수 한다.

아. 녹색(친환경) 건축물 분야

1) 환경부하가 저감될 수 있는 환경건축기법을 도출, 자연 친화적인 설계를 지향하며 경제성을 고려한 지속가능한 건축물을 구현한다.

2) 화석에너지 수요를 최소화하기 위하여 패시브(Passive)형 설계 및 신재생에너지를 이용하는 에너지 절약형 설계를 적극 고려한다.

3) 에너지절약형 설계(패시브형 디자인 등), 생태디자인 건축 등 지속 가능한 친환경 건축물 구현에 따른 공사비 상승요인을 최소화한다.

4) 주변 환경과의 유기적 연계를 도모하여 자연환경을 보전하는 동시에 이용자들의 건강과 쾌적함을 향상시키는 설계를 지향한다.

5) 주변대지 및 도로와의 접근성을 용이하게 하고 보행 및 자전거 교통체계, 친환경 교통수단을 적극적으로 도입하여 주차공간 및 환경오염원을 최소화하는 방안을 마련한다.

6) 친환경적인 계획방식을 적극적으로 건축계획의 요소로 활용함으로써 경제성을 추구함과 동시에 지속가능하고 환경친화적인 도시이미지를 만들 수 있도록 계획한다.

7) 친환경적인 요소가 시설의 상징성, 공공성, 경제성, 기능적 합목적성 등의 다른 원칙을 위배하지 않도록 계획한다.

자. 에너지절약 계획 분야

1) 건물의 방위에 따른 배치, 용도 및 사용시간 등에 따른 평면계획과 조닝계획, 건축 구조체 축열 및 축냉 효과를 활용할 수 있는 시스템을 고려하여 검토한다.

2) 건물의 방위설정은 건물에의 접근, 대지의 고저 및 향, 조망, 통풍, 냉난방 등을 감안하여 설정하되, 계절별 특성과 태양 궤적, 풍향 등을 감안하여 자연에너지를 최대한 활용할 수 있도록 실 배치, 창호 등을 계획한다.

3) 남·동·서쪽 면에 접한 실은 태양 입사각에 따라 창호 외부에 차양시설 등을 계획한다.

4) 반투명·투명, 낮은 내부 칸막이를 이용하고, 창의 형태 등을 검토하여 주광의 집성을 극대화한다.

5) 외벽, 지붕, 창호 등에서 발생하는 열교 현상을 최소화하고, 외부 출입구에는 방풍실을 계획한다.

6) 에너지절감 및 국가정책에 부합코자 신재생에너지(지열, 태양광발전 등)설비 등을 계획한다.

7) 설비계획에서 절수기기(절수용 변기, 변기세정수로 손 씻는 장치, 샤워인 클로저, 절수형 샤워 헤드, 절수용 음수대 등) 설치를 적극 도입 계획한다.

8) 건축물의 바깥쪽과 접하는 거실의 창 및 출입문은「건축물의 설비 기준등에 관한 규칙」제21조 및「건축물의 에너지절약 설계 기준」에 적합하게 설계한다.

9) 신·재생에너지, 빗물관리시설 설치 등 미래지향적·친환경·에너지 절약형 공공시설을 지향하여 주변환경과 조화를 이루면서 건축물 에너지효율을 높인 친환경 건축계획으로 저탄소 녹색성장을 구현한다.

10) 예비인증등급은 건축물에너지효율(1++), 제로에너지인증(4등급)을 획득한다.

차. 신·재생에너지 분야

1)「신·재생에너지 개발·이용·보급촉진법」 및 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 의한 에너지사용계획서를 작성하고, 「신에너지 및 재생에너지 개발⸳이용⸳보급 촉진법 시행령」 제15조에 따라 설계한다.

2) 신·재생에너지설비에 대하여 실시계획승인 시 설치계획서를 제출하여야 한다.

3) 신·재생에너지 시스템을 적용하고자 할 경우 지역적 특성, 도입규모, 유지관리방법, 에너지절감 효율 등을 충분히 고려하여 계획한다.

4) 일조시간 분석, 집광장치 설치 등 창의적인 제안 및 신기술, 신공법 등을 통해 신재생에너지의 이용율을 극대화한다.

5) 재생에너지 설비(태양광, 지열, 태양열, 연료전지 등)의 방식 적용에 대하여 발주청과 사전 협의를 진행한다.

카. 무장애 분야(장애물 없는 생활환경 인증)

1) 유니버설 디자인(Universal Design)이란 신체적으로 건강하고 정신적으로 판단력이 있는 사람뿐만 아니라 어린이, 노인, 장애인 등과 같이 다양한 신체적·정신적 특성을 지닌 모두 쓸 수 있도록 하는 디자인이다.

2) 장애인, 여성과 고령자 등 사회적 약자가 쉽게 이용할 수 있도록 유니버설디자인(Universal Design) 요소를 고려한 공간을 계획한다.

3) 무장애 계획은 이용자의 접근성, 안전성, 식별성에 목표를 두고 설계한다.

4) 옥내·외에서는 비장애인은 물론 시각 및 신체장애자가 이동 시 불편함이 없도록 건물 내·외부 공간에 장애물이 없도록 한다.

5)「장애인·노인·임산부 편의증진보장에 관한 법률」의 기준에 따라 계획한다.

6) 설계용역자는 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free) 인증(우수등급 이상)과 관련한 용역업체의 설계내용을 설계도서에 반영하여야 한다.

타. 기타사항

1) 설계용역자는 설계과정에 있어 용역지침 및 제반사항을 준수하되 기타 미비 또는 의문사항이 발생될 때에는 발주청과 협의를 거쳐 결정한다.

2) 본 과업을 수행함에 있어 일어나는 모든 사고는 설계용역자 책임 하에 필요한 조치를 취한다.

3) 설계용역자는 현장을 사전 답사하여 건물부지에 대한 도시계획 및 급·배수, 전기시설 등 기타 설계시 필요한 사례와 자료를 충분하게 수집 분석 후 설계에 착수토록 한다.

4) 설계용역자에는 각종 관계법규 및 설계기준을 적용하여야 하며 설계완료 이전이라도 발주청의 요구가 있을 시에는 항시 그 성과를 정리하여 제출토록 한다.

5) 설계용역자는 각종 인증획득을 위한 신청서류를 작성하여 설계용역 기간 내 예비인증을 받도록 하여야 하며, 심사기관에 제출된 서류가 용역자의 책임 있는 사유로 보완 및 반려 등이 되어 추가 심사수수료가 발생될 시에는 용역자 부담으로 진행한다.

6) 공사비 산출

- 사업추진을 위한 공사비 산출

- 공종별[건축, 토목, 구조, 기계(소방), 조경, 전기, 통신, 부대 등] 공사비 산출 내역

7) 제출된 설계도서에 대한 하자

- 설계용역자는 설계구조의 불합리 등으로 발생하는 하자와 설계수량의 착오로 인한 피해가 있을 시 또는 설계자로서의 의무와 필요한 조치를 이행하지 않음으로써 발생되는 형사상, 민사상 책임을 지며 변상의 의무 및 책임을 진다.

8) 설계용역자는 설계도서에 대한 내용의 보완에 철저를 기하여야 하며 이에 필요한 서류를 제출한다.

9) 납품 및 검수

- 설계용역자는 발주청에 설계도서를 제출하여 검토를 받아야 하며, 최종 설계도서는 검사를 받은 다음 완료일까지 제출토록 한다.

10) 하도급 신고

- 설계용역자는 건설기술진흥법 제35조제4항 같은 법 시행규칙 제31조에 따라 설계용역의 하도급을 체결하였을 경우 즉시 발주청에 통보하여야 한다.

11) 인증획득을 위한 도서 반영

- 설계용역자는 각종 인증획득을 위하여 별도 추진하는 인증관련 용역내용을 적용하여 설계에 반영하여야 한다.

12) 기 제출된 설계도서의 저작권은 발주청에 귀속한다.

제4장 설계도서 작성요령 및 성과품 납품

1. 설계도서 작성요령

가. 일반 사항

1) 설계지침서 및 관련법령에 근거에 의해 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 모든 도면은 정부에서 제정, 보급하게 되는 건설CALS/EC 전자도면 작성표(안)에 준하여 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD(또는 USB)에 저장하여 제출한다.

4) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

5) 기계설비, 정보통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

6) 보고서, 설계도면, 구조 및 수리계산서, 지반조사 보고서, 측량도면 등 모든 제출 서류는 설계 참여자(사업책임자, 분야별 책임자, 설계자, 책임기술자)가 확인 후 서명 또는 날인하여 제출한다.

7) 기타 분야별 세부사항으로 규정되어 있지 아니한 사항에 대하여는 일반사항을 적용하고 구체적인 사항은 분야별 감독관과 협의하여 결정한다.

나. 설계도서의 분리작성

건축(토목, 조경 포함), 설비(건축설비, 기계설비), 소방(기계), 소방(전기), 통신, 폐기물처리 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. 단, 발주단위에 대하여는 발주처와 협의하여 결정한다.

다. 도면 작성

1) 제도용지(트레이싱 페이퍼)는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

2) 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

3) 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

4) 토목, 건축, 기계설비, 통신도면은 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

5) 설계도면에는 ｢건설기술진흥법시행규칙｣ 제43조(설계도서 작성 참여 기술인의 업무 수행내용 명기)에 의거 모든 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

라. 설계 설명서

1) 공통분야

공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.

2) 건축분야

기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 인천광역시 도시디자인 기본계획 반영, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 차량, 보행자 동선 등에 관한 동선계획 등을 설명 한다.

3) 기계분야

주요설비, 냉․온 열원, 도시가스, 환기, 위생, 소방 등 기타설비, 친환경 설계내용, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등을 설명 한다.

4) 전기분야

전력간선, 전등전열 기타 관련 설비, 전기 및 전화설비 공급 방법, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 친환경 설계내용, 세부공정 계획, 세부공사비 산정, 친환경 설계내용 등을 설명 한다.

5) 통신분야

통신선로, 방송설비, 감지설비, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등을 설명 한다.

6) 토목분야

도로 및 포장설계, 지반조사, 흙막이 공법 및 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 골재원 및 사토장 선정 , 배수처리계획(공사중계획 포함), 신기술, 신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등을 설명 한다.

7) 조경분야

식재 및 시설물 계획, 옥상녹화계획, 수목이식계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획, 기존수목 현황도 등을 설명 한다.

2. 설계도서의 분리작성

건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방설비 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 발주청과 협의하여 결정하여야 한다.

3. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 ｢지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준｣ 제9장 계약 일반조건 ‘사용언어’ 항목에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면: A  (인테리어도면: I )

2) 건축구조도면: S

3) 토목도면: C

4) 조경도면: L

5) 기계설비도면: M (소화설비도면: MF)

6) 전기소방: EF

7) 통신도면: T

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 통신 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 특기시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

4. 성과품의 납품시기

가. 성과품의 납품은 기본설계 납품, 실시설계 최종납품 등으로 구분하여 제출한다.

1) 기본설계도서: 착수일로부터 30일 이내에 제출

2) 중간검토보고 제출 설계도서 등: 검토보고일 기준 3일 이내에 제출

3) 최종납품도서: 착수일로부터 120일 이내에 제출

나. 설계자는 납품 10일 전 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고1부씩을 제출하여 예비검사를 받고, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

다. 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주처의 승인을 득한 후 실시하여야 한다.

라. 상기 설계도서의 제출일정과 그 밖의 각종 보고용 제출도서는 발주처와 설계자가 상호 협의하여 조정토록 한다.

5. 성과품의 납품목록

가. 기본설계도서 제출목록

: 과업의 특성 및 발주처의 요구에 따라 관계서류의 규격 및 소요부수는 변경가능하며, 세부 작성내용은 [붙임1]자료를 참고하여 작성하여야 한다.

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	조경	토목	기계	전기	통신	소방
1	설계설명서	A4	5	부
2	법규검토서	A4	5	부
3	유사시설검토서	A4	5	부
4	개략공사비 검토서	A4	5	부
5	각종 인증 검토서	A4	5	부
6	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	평철
7	계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기, 표준 등
9	CD-ROM (USB)		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
10	기타 발주처 요구사항		5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

나. 실시설계도서 제출 목록

1) 과업의 특성 및 발주처의 요구에 따라 관계서류의 규격 및 소요부수는 변경가능하며, 세부 작성내용은 [붙임2]자료를 참고하여 작성하여야 한다.

2) CD(또는 USB)는 준공도서 사본 작성 관리지침(국토교통부)을 참조하여 제작한다.

구분	설계도서명		규격	수량	단위	공 종							비 고
						건축	조경	토목	기계	전기	통신	소방
1	설계설명서		A4	10	부
2	설계도면		A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	백상지, 반첩
3	설계도면		A3	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반첩
4	계산서		A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	건축분야는 구조계산서
5	내역서	(통합)	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		(분리)		각5
6	관급 내역서	(통합)	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		(분리)		각5
7	수량 산출서	(통합)	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		(분리)		각5
8	단가 산출서	(통합)	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
		(분리)		각5
9	일위 대가표	(통합)	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
		(분리)		각5
10	시방서	(통합)	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기, 표준 등
		(분리)		각5
11	조감도, 투시도		A1	2	매	◯							도면 표기시 미제출
12	CD-ROM (USB)			5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
13	지장물 전수조사			5	부								대장 및 조서포함
14	예정공정표		A3	5	부								산정근거 포함
15	기타 발주처 요구사항			5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	과업 중 필요사항

다. 유지관리 지침서 등 작성

1) 공사 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성한다.(생활폐기물 및 의료폐기물에 대한 폐기물처리계획 포함)

2) 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비 등이 포함되어야 한다.

라. 기타

1) 공정표

공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 5부(A4, A3)를 제출하고 내용은 CD(또는 USB)에 포함되어야 한다.

2) 조감도(A1 이상, 표구 포함) 2부

3) 기타 관련서류

① 시설물 건립에 따른 인․허가 서류 및 도서

② 환경 및 교통영향평가 등 각종 평가 반영도서

*상기 납품목록은 발주부서와 협의하여 최종 납품부수와 산출물을 결정할 수 있다.

【붙임 1】

기  본  설  계  내  용

가. 건축

종 류			내 용	비고
일반사항	개략 시방서		주요공사 및 자재에 대한 시방서 초안 작성
	공사비 개산서		계획설계 적용기준에 따라 개략공사비를 계산하여 예산과 비교
	건축계획서		공사개요(위치, 대지면적등)
			건축물규모(건축면적, 연면적, 높이, 층수 등)
			건축물 용도별 면적, 주차장규모
			배치계획
			주차 및 동선계획
			평‧입‧단면 계획
	법규 검토서		관련사항에 따른 법규검토
도면	도면 목록표		공종 구분해서 분류 작성
	안 내 도		방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록
	구 적 도		대지면적에 대한 기술
	실내재료마감표		바닥, 벽, 천정 등 실내마감
	배 치 도		축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청건물과 기존건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계
	주차계획도		법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련위치 및 구조
			옥외 및 지하 주차장 도면
	각층 및 지붕 평 면 도		기둥‧벽‧창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치
			방화 구획 및 방화벽의 위치
	입면도(2면이상)		주요내외벽, 중심선 또는 마감선 칫수, 외부마감재료
	단 면 도 (종․횡단면도)		건축물 최고높이, 각층의 높이, 반자높이
			천정내 배관 공간, 계단 등의 관계를 표현
	투 시 도		투시도 또는 조감도
상세도	수 직 동 선 상세도	코아 상세도	코아 내의 각종 설비관련 시설물의 위치
		계 단 평면․단면상세도
		주차경사로 평․단면상세도
		주차리프트 평․단면상세도
	부 분 상세도	지상층 외벽 평․입․단면도
		지하층 부분 단면 상세도
	천정도	천정 평면도
	창호도	창호 평면도
		창호 잡철물	각 창호에 적용되는 철물
기타	정화조	평면․단면도
		용량 계산서
	특수 분야 계획 검토	차음․방음, 방진
		무대조명
		전기음향설비
		건축음향
		기 타	발주기관에서 필요한 도면 (인테리어 도면 등)

나. 구조

종 류		내 용	비고
일반사항	구조계산기준	실별 적재하중, 구조계산기준제시
	구조 계산서
	설계 설명서	지질조사서에 대한 검토 의견포함
도면	기초일람표
	구조 평면도	기초에서 옥탑까지 작성
	가 구 도	골조의 단면 상태를 표현하는 도면으로 골조의 상호 연관관계를 표현
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도
	기둥 일람표
	보 일람표
	슬래브 일람표
	옹벽 일람표
	인접 시설물 구조검토평가서
	잡배근 일람표
	주 심 도

다. 기계

종 류		내 용	비고
일반사항	개략 시방서	기계일반시방 및 특기시방서(초안) 작성 ∙ 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항 ∙ 무대장치 및 설비 품목 작성
	개략공사비 계 산 서	각 공종별 단위면적당 공사비개념으로 개략 산정
	설계 설명서	계획 설계시의 내용을 발전 확정 ∙ 공사 개요: 위치 ․규모 ․공사기간 ․공사 금액 등 ∙ 주요기계설비 - 공기조화, 냉․난방, 위생, 소화, 가스, 자동제어, 기타설비 ∙ 에너지 절감 및 유지 관리에 관한 사항 ∙ 주요 시공 계획 ∙ 개략 공정 계획
	개략부하 계 산 서	설계기준에 따라 단위면적당 부하를 기준 ∙ 주요 설비 개략 용량 계산서 ∙ 간이 부하 계산서
	소방시설 계 획 서	∙ 건물종별, 규모별, 층별 소방시설 계획에 관한 종합적 서류
도면	일반 사항	∙ 범례 ∙ 도면 목록 ∙ 기계 ․기구 일람표(수량, 용량, 사양 등)
	배 치 도	∙ 상하수도의 연결 관계, 수조, 위험물 저장소, 각종 탱크, 정화조, 기계실의 위치, 기기 반 ․출입구의 표시, 가스, 오수 및 배수 계획 등
	계 통 도	∙ 기계 설비의 자동제어 시스템, 공기 조화, 냉 ․난방, 위생, 소화, 가스 기타 설비의 계통도
	평 면 도	∙ 각종 설비 샤프트(Shaft)의 크기, 유지보수 공간을 고려한 기계실평면도 및 장비배치도, 기준층 및 특수층의 설비평면도 ∙ 기계실, 공조실 등의 장비배치방안 계획
	기 타	∙ 발주기관에서 필요한 도면

라. 전기

종 류		내 용	축 적	비고
일반사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	각종 부하계산서	변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량
	설계 설명서
	도면 목록표	도면 목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	주요장비의 사양을 표기
도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상
		통신 배치도	1/100이상
		소방 배치도	1/100이상
	계통도	전력간선 계통도
		통신 계통도
		소방계통도
	평면도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상
		기계실 장비설치 평면도	1/100이상
		전력 설비 평면도	1/100이상
		조명 설비 평면도	1/100이상
		통신 설비 평면도	1/100이상
		방범 설비 평면도	1/100이상
		소방 설비 평면도	1/100이상
		방송 설비 평면도	1/100이상
	상세도	조명기구 상세도	1/5이상
		설비용 핏트 상세도	1/5이상
		피뢰침 상세도	1/5이상
		접지 설비 상세도	1/5이상
		TV안테나 설치 상세도	1/5이상

마. 토목

종 류		내 용	비고
일반사항	개략 시방서	토목 일반시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	각종 평면도	주요시설물 계획
	대지 종․횡 단면도
	토공사 계획도
	포장계획 평․단면도
	보도블럭 평면도
	담장 계획도
	우․오수배수처리 평․종단면도
	상하수 계통도	우․오수배수처리 구조물 위치 및 상세도 공공하수도와의 연결방법, 상수도 인입계획, 정화조의 위치

바. 조경

종 류		내 용	비고
일반사항	개략 시방서	일반 시방 및 특기시방서(초안) 작성
	개략 공사비 계산서	기본설계 도서에 따라 개략공사비 산정
	설계 설명서
도면	도면 목록표
	조경 배치도	법정 면적과 계획면적의 대비, 조경계획 및 식재 상세도
	식재 평면도
	단면도

【붙임 2】

실 시 설 계 내 용

가. 건축

종 류			축 적	비고
일반사항	공사시방서 및 물품 시방서, 관급자재 시방서
	설계 개요 (기계, 통신도면에 수록)
	각 공종별 공사비 내역서
	각종 계산서
	심의에서 각종 인허가 관련자료
일반도면	표 지
	도면 목록표
	안 내 도
	구 적 도
	지 적 도
	면적 산출표
	대지 종․횡단면도
	배 치 도		1/100내외
	주차계획도		1/100내외
	평 면 도		1/100내외
	입면도(2면 이상)		1/100내외
	단면도(종․횡단면도 등) (기계, 통신도면에 수록)		1/100내외
	실내벽 및 반자의 마감도 (기계, 통신도면에 수록)		1/100내외
상세도면	수직 동선 관련 상 세 도	코아 평면상세도	1/5∼1/50
		계단 평 ․ 단면상세도	1/5∼1/50
		승강기 . 샤프트 평․단면상세도	1/5∼1/50
		주차 경사로 평․단면상세도	1/5∼1/50
		장비 배관(코어, 비트) 상세도	1/5∼1/50
상세도면	부분 상세도	주요부분 상세도	1/5∼1/50
		주출입구부분 평, 입, 단면상세도	1/5∼1/50
		부출입구부분 평, 입, 단면상세도	1/5∼1/50
		샷다 상세도	1/5∼1/50
		핏트 상세도	1/5∼1/50
		발코니 상세도	1/5∼1/50
		출입구 상세도	1/5∼1/50
		지상층 외벽 입면․단면 상세도	1/5∼1/100
		지하층 단면 상세도	1/5∼1/100
		주요부분 내벽 상세도	1/5∼1/100
	창호도	창호 일람표	1/5∼1/50
		창호 평면도	1/5∼1/50
		창호 상세도	1/5∼1/50
		창호 입면도	1/5∼1/50
		창호 잡철물 목록	1/5∼1/50
	천정도	각층 천정 평면도 (기계, 통신도면에 수록)	1/5∼1/50
		천정 상세도	1/5∼1/50
		부분 상세도	1/5∼1/50
		천장 관련 설치 상세도	1/5∼1/50
	내부 상세도	로비바닥패턴도	1/5∼1/50
		로비 전개도	1/5∼1/50
		주요실 전개도	1/5∼1/50
		승강기 HALL 전개 상세도	1/5∼1/50
		화장실 전개 상세도	1/5∼1/50
		칸막이 전개도 및 상세도	1/5∼1/100
	실내 부위	실내마감 상세도	1/5∼1/50
	부품도	각 부품도	1/2∼1/50
기타	정화조	건축용 평․단면도	1/5∼1/100
		각종 설비도
		계산서
	특수 분야 도면	소음․방진, 조명, 음향, 인테리어 등

나. 구조

종 류			축 적	비 고
일반사항	구조계산서
	시 방 서
	설계 설명서(종합 보고서에 수록)
도면	도면 목록표
	구조 평면도		1/30∼1/200
	구조 단면도		1/30∼1/200
	기초일람표		1/30∼1/100
	앵커배치도 및 BASE PLATE 설치도		1/30∼1/100
	기둥 일람표		1/30∼1/100
	보 일람표		1/30∼1/100
	슬래브 일람표		1/30∼1/100
	옹벽 일람표		1/30∼1/100
	철골, 철근배근 일람표		1/30∼1/100
	잡배근 일람표		1/30∼1/100
	주 심 도		1/30∼1/200
상세도면	계단 및 코아 상세도	계단 상세도	1/30∼1/50
		경사로 상세도	1/30∼1/50
		코아 상세도	1/30∼1/50
	접 합 상세도	기둥접합 상세도	1/5∼1/50
		보접합 상세도	1/5∼1/50
		BRACE접합 상세도	1/5∼1/50
		DECK PLATE 설치도	1/5∼1/50
		STUD BOLT 설치도	1/5∼1/50
		ANCHOR BOLT 상세도	1/5∼1/50
	잡 상세도		1/5∼1/50
	가구도		1/5∼1/50
	각부구조 상세도		1/5∼1/50
	기 타 상세도	보 OPENING 위치도	1/5∼1/50
		캐노피	1/5∼1/50
		지휘자대기실	1/5∼1/50
		TRUSS	1/5∼1/50

다. 기계

종 류		내 용	축 적	비고
일반사항	시 방 서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 무대분야 중점으로 상세히 기술 ∙ 공종별 일반사항 ∙ 당해 공사에 필요한 특기 사항 ∙ 일반시방서, 특기시방서, 관급 자재 시방서
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부공사비를 산정하여 작성 ∙ 내역서, 일위 대가표, 물량산출근거, 단가산출근거, 각종 계산 근거등
	부하계산서	설계 기준에 따라 세부 부하 계산 ∙ 주요 기계 설비의 용량 계산서 및 선정서 ∙ 부하 계산서
	설계 설명서 (종합 보고서에 수록)	설계 과정에서 확정된 내용 정리 ∙ 공사개요: 위치, 규모, 공사기간, 공사 금액 등 ∙ 주요 기계 설비 - 공기 조화, 위생, 냉․난방, 소화, 가스, 자동제어, 기타 설비 ∙ 에너지 절감 및 유지 관리에 관한 사항 ∙ 세부 시공 계획 ∙ 세부 공정 계획
도면	도면 목록표	∙ 도면목차, 범례, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비일람표	∙ 주요 장비의 사항을 알아보기 쉽도록 표기(전기도면에 표기)
	배 치 도	∙ 중간 설계시 표기된 사항을 구체화한 내용 ∙ 옥외에서의 급배수, 도시가스, 유틸리티 등의 인입, 인출과 관경 및 위치 등을 표시	1/100 이상
	각 설 비 계 통 도	∙ 기계 설비의 자동제어 시스템, 공기조화, 냉․난방, 위생, 소화, 가스, 기타 설비 등의 세부 계통도 ∙ 기계실, 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 설비 단면도	-
	각 설비 평면도	공조, 냉난방, 환기, 위생, 소화설비, 가스 등에 대한 내용 등을 표시	1/100 이상
도면	기계실 및 공조실 확대 평면도, 단면도	∙ 각종 설비의 기준층 및 특수층의 주요 단면도, 기계실 단면도 ∙ 각 설비별 기계실 배관에 대한 확대 평면도 ∙ 기계실 입체 배관도, 공조실 입체 배관도	1/5∼1/50
	화장실 확대 평면 상세도	화장실 배관 등에 대한 확대평면	1/5∼1/50
	저수조, 고가수조 배치 및 상세도	설치기준을 표시, 평․단면도	1/5∼1/50
	설비용 핏트 (PD, AD등) 상세도	설치 및 유지 보수 등을 위한 적절한 공간 검토 확인	1/5∼1/50
	옥외공동구	옥외 공동구 관리 및 각종 설비 평면도, 단면도(확대도면) 포함	1/100이상
	연도 상세도	보일러 및 발전기 등의 연도 상세	1/5∼1/50
	각종 장비상세도, 단 면 도	∙ 각종 설비별 상세도 ∙ 시공에 필요한 사항 일체	1/5∼1/50
	자동제어도면(별도)	구성도
		무대상․하부자동제어시스템
		장비, 밸브, 관제점, 패널 일람표
		계통도 및 평면도

라. 전기

종 류		내 용	축 적	비 고
일반사항	시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	각종 부하 계산서	변압기용량, 부하, 조도, 발전기 용량
	설계 설명서
	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	장비 일람표	주요장비의 사양을 표기
도면	도면 목록표	도면목차, 번호 등을 알아보기 쉽도록 표기
	인입 배치도	전력 배치도	1/100이상
		통신 배치도	1/100이상
		소방 배치도	1/100이상
	계통도	전력간선 계통도
		통신 계통도
		소방계통도
	평면도	전기실 장비설치 평면도	1/100이상
		기계실 장비설치 평면도	1/100이상
		전력 설비 평면도	1/100이상
		조명 설비 평면도	1/100이상
		통신 설비 평면도	1/100이상
		방범 설비 평면도	1/100이상
		소방 설비 평면도	1/100이상
		방송 설비 평면도	1/100이상
	상세도	조명기구 상세도	1/5이상
		설비용 핏트 상세도	1/5이상
		피뢰침 상세도	1/5이상
		접지 설비 상세도	1/5이상
		TV안테나 설치 상세도	1/5이상

마. 토목

종 류		내 용	축 적	비 고
일반사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	시방 및 도면에 따라 세부 공사비를 산정하여 작성
	설계 설명서
도면	주요 평면도		필요축적
	대지종․횡 단면도		필요축적
	토공사 평․단면도		1/5∼1/100
	흙막이 상세도	굴토깊이 10M 미만	1/5∼1/50
	포장 상세도		1/5∼1/50
	보도블럭 및 측구 상세도		1/5∼1/100
	옹벽 평․단면 전개도		1/5∼1/100
	옹벽 상세도		1/5∼1/100
	담장 입․단면도		1/5∼1/100
	담장 상세도		1/5∼1/100
	방음벽 상세도		1/5∼1/100
	지하매설 구조물 현황
	우․오수 배수 상세도	우․오수배수 처리 노선 상세도(평면도, 종․횡단면도) 및 구조물 상세도	1/5∼1/100

바. 조경

종 류		내 용	축 적	비 고
일반사항	공사 시방서	당해 공사에 요구되는 일반 및 특기사항을 상세히 기술
	공사비 내역서	물량산출 및 내역서
	설계 설명서
도면	도면 목록표	도면 목차, 번호등을 알아보기 쉽도록 표기
	배치도	공사계획 및 시설물배치도	1/100이상
	평면도	배식 평면도 및 수량 집계	1/100이상
		포장계획 평면도	1/100이상
		시설물 평면도	1/100이상
	입면도	식재 입면도 및 플랜터 전개도	1/100이상
	상세도	포장 평․입․단면 상세도	1/10이상
		지주목 상세도	1/10이상
		식재 및 수목보호용 덮개상세도	1/10이상
		조명등 상세도	1/10이상
		플랜터 상세도	1/10이상
		시설물 상세도	1/10이상

＃별지 양식-1

보 안 각 서

1. 용   역   명 : 장곳항 어촌스테이션 조성사업 건축설계 용역

2. 계 약 일 자 : 2025.    .    .

3. 착 수 일 자 : 2025.    .    .

4. 완수 예정일 : 2025.    .    .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행 과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약 일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행 기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주청에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약 특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주청에게 귀속됨을 알고 별도로 발주청의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2025년    월    일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술 분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

강화군 (분임)재무관 귀하

＃별지 양식-2

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용   역   명 : 장곳항 어촌스테이션 조성사업 건축설계 용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원

3. 계 약 일 자 : 2025.   .   .

4. 착 수 일 자 : 2025.   .   .

5. 완수 예정일 : 2025.   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허) 종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2025.    .    .

계 약 자 :

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

강화군 (분임)재무관 귀하

＃별지 양식-2

(기본, 실시)설계 검사원

1. 용   역   명 : 장곳항 어촌스테이션 조성사업 건축설계 용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원

3. 계 약 일 자 : 2025.   .   .

4. 착 수 일 자 : 2025.   .   .

5. 완수 예정일 : 2025.   .   .

붙임  납품설계도서 목록 1부.

(기본, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2025.    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강화군 (분임)재무관 귀하

＃별지 양식-3

주 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 : 장곳항 어촌스테이션 조성사업 건축설계 용역

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 2025년  월  일 ∼ 2025년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

□ 용역 진행사항

구 분	전주 진행사항(2025 . . .)	금주 예정사항(2025. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입 현황 - 외주작업진행 현황 등 - 주요 협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 체험전시 등 분야별로 구분 되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강화군 (분임)재무관 귀하

＃별지 양식-4

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 : 장곳항 어촌스테이션 조성사업 건축설계 용역

□ 용역개요

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 2025년  월  일 ∼ 2025년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

□ 용역 진행사항

구 분	월간 업무수행 내용(2025 . . . ~ 2025 . . .)	비 고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익 월	- 공정 지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강화군 (분임)재무관 귀하