- 전북대학교 남원 글로컬캠퍼스 조성사업 -

기본 및 실시설계 과업지시서

2025. 07.

-  목     차  -

제1장 총 칙	1

1. 과업명칭

2. 과업의 개요

3. 공통사항

제2장 과업의 내용	7

1. 과업의 범위

2. 과업수행 중 단계별 제출서류

3. 업무보고 및 회의

4. 녹색건축물(친환경) 설계

5. 에너지절약형 건축물 설계

6. 설계의 경제성 검토(설계VE)

7. 설계용역평가 대책

8. 관련기관 인ㆍ허가 및 협의 등 설계심의

9. 보안관리 대책

10. 민원발생 방지대책 수립

제3장 과업수행 지침	15

1. 법령 등의 적용기준

2. 설계 일반지침

3. 분야별 계획

4. 설계진행 시 유의사항

제4장 설계도서 작성	42

1. 공통사항

2. 설계도서 작성기준

3. 계획설계

4. 중간설계

5. 실시설계

제5장 성과품의 작성 및 납품	62

1. 성과품 작성

2. 성과품 납품

3. 계획설계 납품도서

4. 중간설계 납품도서

5. 실시설계 납품도서

제1장 총칙

1. 과업 명칭 : 전북대학교 남원 글로컬캠퍼스 조성사업

2. 과업의 개요

1) 과업의 개요

가. 위    치 : 전북특별자치도 남원시 광치동 720 일원

나. 지역지구 : 대학, 계획관리지역

다. 대지면적

- 전체부지 면적 : 395,676㎡

라. 시설개요

- 연면적 : 8,230㎡(주5동)

마. 추정공사비 : 금15,500,000천원(부가세포함)

- 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방설비, 폐기물 처리, 철거공사 등 공사 전반에 대한 금액이며 공종 간 배분하여 공사비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

- 각종 (가스/전기/수도) 인입 ㄴ비용 등 분담금을 조사해 제시하여야 한다.

바. 예정 설계용역비 : 공고서 참조

- 설계비는 조감도, 손해배상보험료, 에너지관련 인증(해당시), 설계경제성검토 비용, 도시계획업무, 구조(내진보강 등), 설계안전보건대장 포함 금액임(부가세 포함)

※ 단, 인증수수료 및 제안공모 보상금 별도

2) 과업기간

가. 본 과업의 기간은 착수일로부터 270일간(공휴일 포함)으로 한다.

- 계약상대자는 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료한다.

나. 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의

경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업 기간을 변경할 수 있다.

- 기술용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

- 기술용역계약일반조건 제24조(불가항력)

- 기술용역계약일반조건 제32조(기술용역의 일시 정지)

- 기술용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 기술용역 정지 등)

- 수요기관의 사업계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

3. 공통사항

1) 적용요령

가. 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되, 세부적인 사항은 계약상대자가 더 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

나. 본 과업지시서 외에 관계 규정 및 각종 시행기준을 준수하여야 하며, 본 과업지시서와 상이한 부분이 있을 때는 본 과업지시서를 우선 적용한다.

다. 본 과업지시서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 정한다.

라. 본 과업지시서에 대한 대안은 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하고 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

마. 발주기관 및 관계부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고, 분야별 전문가의 참여를 유도하여 더 광범위한 의견을 집약시킨다.

바. 각종 계산기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 발주기관과 협의하여야 한다.

사. 신기술 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 검토보고서가 있어야 한다.

아. 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 발주기관의 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

자. 설계내역서 작성은 발주기관 지침(과업지시서 등)에 의하여 업무별 작성 방법을 확인 후 작성한다.

2) 계약상대자의 책임

가. 문서의 기록 비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의 사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업 추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성·비치하여야 하며, 발주기관의 제출 요구가 있을 경우는 이에 따라야 한다.

나. 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 관계 법률이 저촉되는 행위로 인한 모든 피해 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

다. 건축 과정 설계자 참여 (시공단계)

계약상대자는 이 과업을 수행함에 「건축서비스산업 진흥법」 제22조 및「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제19조의 규정에 따라 건축 과정에서 설계도서의 해석과 현장 여건 변화 및 업체선정에 따른 자재와 장비의 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등의 선정 및 변경에 대하여 발주기관이 요구할 경우는 검토·보완 자문을 하여야 한다.

3) 설계검토 및 설계자문

가. 계약상대자는 본 과업 수행 기간 중 발주기관의 설계 중간 검토 및 계획(평면, 동선, 환경, 설비, 통신, 소방 등)내용에 대한 타당성 검토, 설계자문위원회의 자문 등에 필요한 자료 준비 및 협조해야 한다.

나. 중간 검토 등에 대해서는 설계반영 여부를 발주기관에 통보하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

다. 본 과업 수행 기간에 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요한 자료는 계약상대자가 준비하여야 한다.

4) 하도급 사항

가. 계약상대자는 발주기관으로부터 도급받은 설계용역을 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나. 다만 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

- 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

- 지반조사(지하수위 조사)와 이에 부수되는 시험 등 작업

- 건설공사의 수량 및 견적작업

- 기타 발주기관이 인정하는 업무

다. 계약상대자는 「건설기술 진흥법」 제35조 제4항에 따라 하도급 승인을 받기 위해서는 같은 법 시행규칙 〔별지 제32호 서식〕의 “하도급 계약승인신청서”를 발주기관에 제출하여야 한다.

라. 계약상대자의 하도급에 관한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시하는 「건설기술용역 하도급 관리지침」을 준수한다.

마. 하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

5) 타 계약상대자와의 업무한계

본 과업을 수행함에 다수의 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약상대자 상호 간에 과업 분할 협의서를 작성ㆍ수행하여야 한다.

6) 과업내용 변경

가. 계약상대자는 설계용역수행 중에 주요 설계과업 내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역감독자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

나. 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 득한 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

다. 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 용역감독자와 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

- 과업 업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

- 계약 내용에 따른 이행 수량에 의한 정산 변경 시

- 민원 발생으로 과업 수행이 지연 또는 불가능할 때

- 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

- 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

- 지층 상태가 불규칙하여 변경이 불가피할 때

7) 용역수행자의 교체

가. 과업에 참여하는 기술자는 착수 신고 시 제출된 자로 하여야 하며, 발주기관은 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단될 시 용역수행자의 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

나. 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때는 그와 동등 이상의 등급ㆍ경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

다. 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업 수행에 참여하는 기술자의 투입 지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

8) 용어의 해석

가. 과업 수행상 사용문서는 한글과 아라비아숫자로 작성하며, 사용언어는 한국어로 하고 업무상 발주기관이나 계약상대자가 사용하는 모든 통역 및 번역의 소요 비용은 계약상대자가 부담한다.

나. 사용언어 및 문자의 해석에 있어 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 하여야 하고, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽고 정확하게 정의한 후 사용하며, 과업지시서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

9) 설계 등 손해배상

가. 계약상대자는 설계 등 용역계약을 이행함에 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며 계약상대자는 보험 또는 공제에 가입하고 당해 용역을 완료하기 전에 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다.

10) 특기사항 및 설계 시 고려되어야 할 사항

가. 특기사항

- 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업지시서와 관계 법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

- 과업 수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업 내용을 변경할 수 있다.

- 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업 수행상 필요로 추가의 과업을 요청할 경우는 상호 협의하여 결정하며, 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

-도시·군계획시설 결정(변경) 도서 작성, 실시계획인가 업무를 수행한다

-건설기술진흥법 시행령 98조제1항에 따른 설계안전성 검토 업무를 수행한다

-산업안전보건법 제67조 및 건설공사 안전보건대장 의 작성 등에 관한 고시에 따라 설계안전보건대장 업무를 수행한다.

-건설기술진흥법 시행령 제75조(설계의 경제성등 검토)에 근거하여 기본 및 실시설계 단계에서 업무를 수행한다.

나. 설계 시 고려되어야 할 사항

- 설계변경 및 공사비 증액 요인이 발생하지 않도록 하여야 한다.

- 환경친화적 건설공사를 위한 공법 및 적용기준을 제시하여야 한다.

- 건설폐자재 등 친환경 자재에 대한 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

- 설계에 적용 가능한 건설 신기술의 공법 및 적용기준을 제시하여야 한다.

- 발주기관과 시공자 간의 클레임(claim)이 발생하지 않도록 설계도서를 작성하여야 한다.

- 공사시방서에 시공상세도면의 목록을 제시하여야 한다.

- 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 결과조사 및 검토하여 본 설계에 반영하여야 한다.

- 건설공사 사후평가 결과 작성을 위한 실시설계 사후평가표를 작성하여야 한다.

- 태풍ㆍ우기·동절기 등 이상기후 시 공사 중지 기간 등을 충분히 고려하고 「공공 건설공사의 공사 기간 산정기준(국토부 훈령 제1140호)」을 적용하여 공사 기간을 산정한다.

- 「산업안전보건법」 제30조에 따라 계상되는 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 「건설기술 진흥법」 제63조 등에 따른 안전관리비용(시설물의 안전관리를 위한 비용)을 계상하여야 한다.

- 본 과업 내용에 명시되지 아니한 사항(건축협의에 의한 조건부 사항, 기본설계 설계자문 결과 미반영된 사항, 발주기관과 주민 요구사항, 기타) 등에 대해서도 발주기관의 지시가 있을 때는 성실히 수행해야 한다.

11) 품질관리방안

가. 계약상대자는 과업 수행 계획서에 설계 과업 수행 시 발생하기 쉬운 오류와 설계 성과품의 품질 향상을 위한 품질관리방안을 작성하여 제출하여야 한다.

나. 품질관리 방안에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- 품질관리 조직표

- 설계 점검 흐름도

- 점검시기 및 회수

- 점검사항 및 점검 방법

- 기  타

12) 언  어

과업 수행 사용문서는 한글로 작성하며, 사용언어는 한국어로 하며 설계서나 보고서     작성과 관련된 통역 및 번역의 소요 비용은 계약상대자가 부담한다.

13) 기  타

가. 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

나. 계약상대자는 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 소유권 및 저작권 등에 관련한 제반 사항은 저작권법이 정하는 바에 따른다.

다. 설계용역 성과물의 저작권 및 특허권은 용역 완료 후 그 사용권은 발주기관에 있다.

제2장 과업의 내용

1. 과업의 범위

1) 상기 설계도서는 본교에서 제시하는 건물 연면적, 공사비 예산액 등을 감안하여 건축법, 국토계획 및 이용에 관한 법률, 소방 관계법 등 제반관련 법규에 적법하게 설계하여야 하며, 설계 공모 심사위원 보완 요구사항 및 유관기관 협의 결과를 수렴하여 수정안을 작성하고 본교와 협의․확정한 후 설계를 추진하여야 한다.

2) 본 설계용역의 계약상대자는 본교가 제시한 공사비 예산액 범위 내에서 설계가 이루어질 수 있도록 설계에 만전을 기하여야 한다.

3) 본교의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 설계자문 회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 수급인은 본교의 요청에 의한 관련 자료(설명서, 도면, 간략 모형, 투시도 등)를 작성, 제출하여야 한다. 필요에 따라 회의 진행에 관한 세부 사항은 본교에서 별도 통보 할 수 있다.

4) 설계자는 사업부지 면적에 적합하게 현황측량 후 설계용역 업무를 수행하여야 한다.

5) 최종 실시설계용역의 완료 시점은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률이 정하는 바에 따른 실시계획 변경, 건축계획심의, 건축협의, 구조안정성 심의(해당 시) 등 건축 관련 행정관청 인ㆍ허가 등 필요한 행정절차를 대행하여 완료하는 시점으로 한다. 다만, 건축 관련 인ㆍ허가에 필요한 행정절차의 경우 그 시기에 관하여 본교와 계약상대자 간 상호 협의에 의한 조정이 가능하다.

6) 계약상대자는 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축 협의 불가, 구조적인 모순, 물량 누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생 되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자 내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가 과업을 수행하여야 한다. 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계 과오로 판단될 경우 관계 법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

7) 설계VE용역 등 설계와 관련한 각종 용역 진행에 대한 업무 협조(회의 참석, 자료 제출, 용역 결과의 설계반영 등)하여야 한다.

8) 공사 발주와 관련, 발주 공종별 현장설명서 작성 및 적정 공사 기간(예정 공정표 포함) 산출하여야 한다.

9) 주요 공용공간은 세부 계획에 대하여 기획․설계하여야 한다. (추후 수요기관과 협의 지정)

10) 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관(감독관)이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성하여야 한다.

11) 지장물 조사

가. 계획구간 내 각종 지하 매설물 및 지상 시설물에 대해 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계에 반영한다.

나. 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상수도관, 하수도, 가스관, 통신케이블 등)은 해당 기관과 협의 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

다. 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

12) 본 과업을 수행함에 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 수요기관과 계약상대자의 협의 하에 수행한다.

13) 현대 건물의 개방성, 공동 사용의 개념을 반영하여 설계하도록 한다

예) 초고가 장비로 자기장이나 고압의 영향 등으로 불가피한 경우를 제외하고 대부분의 장비는 공동 공간에 배치하고 실내가 보이는 개방적 공간을 고려

14) 개념 설계위원회(총장, 관련 보직자, 전문가 등) 구성하여 내부의견을 반영하고 벤치 마킹한 국내외 실제 사례를 제시하고 창의성 있는 건물을 계획하도록 한다.

2. 과업수행 중 단계별 제출서류

1). 계약상대자는 용역착수 시에 다음 서류 2부를 착수일에 제출한다.

① 착수계 1부

② 책임기술자 선임계 1부

③ 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

④ 과업수행계획서 1부

⑤ 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

⑥ 각 공종(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무 내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

⑦ 설계용역 예정공정표 1부

※ 별첨 예정공정표를 참고하여 당해 사업 특성에 맞게 조정하여 제출

⑧ 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

⑨ 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

⑩ 인력, 장비투입 예정 현황 1부

⑪ 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

⑫ 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

2) 계약상대자는 착수계 제출 후 7일 이내에 착수 회의를 개최하여야 하며, 위 “가”호로 승인된 착수 회의 자료를 근거로 당해 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

3) 계약상대자는 계획설계 납품검사원 제출 7일 전 다음 서류를 사업 담당 감독관에게 제출하여 협의·확인하여야 한다.

① 주요 내용

- 관련법규검토

- 배치, 평면안 검토

- 구조공법 검토

- 설비공법 검토

- 현장조사의 적정성 검토

- 수요기관 요구 적용 여부

② 관련 법규 검토서

③ 수요기관 요구사항 반영 도면

4) 계획설계도서 납품 (감독관 협의 및 검토 결과 반영)

① 계획설계 검사원 [붙임 5]

② 세부 제출 도서는 제6장 참조

③ 관련 법규 검토서

④ 현장조사 결과보고서

⑤ 유사 시설 견학보고서

⑥ 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

⑦ 기타 발주기관 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

5) 계약상대자는 중간설계 납품검사원 제출 7일 전 다음 서류를 사업 담당 감독관에게 제출하여 협의·확인하여야 한다.

① 주요 내용

- 공사비 검토(총괄, 분야별)

- 설계도면 검토(분야별)

- 공사시방서 검토

- 구조계산서 검토

- 예산초과 시 절감 방안 검토

- 부하계산서 검토

- 관급자재 선정 반영 검토

② 개략 공사비 내역서

③ 공종별 설계도면

④ 공사시방서(초안)

⑤ 구조계산서 등 계산서, 물량산출서

⑥ 예산초과 시 예산절감방안 검토서

6) 중간설계도서 납품 (감독관 협의 및 검토 결과 반영)

① 중간설계 검사원 [붙임 5]

② 세부 제출 도서는 제6장 참조

③ 중간설계도서

④ 지반조사보고서

⑤ 주요 공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안 제시 및 선정 사유, 예산 비교 등)

⑨ 기타 발주기관 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

7) 설계VE 반영결과 제출

① 설계VE 검토, 확인, 반영된 설계도면

② 설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

③ 설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

④ 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

7) 도시·군계획시설 결정(변경) 도서 작성, 실시계획인가 도서 제출

①  도시·군계획시설 결정(변경) 도서 작성(각종 영향 분서그 지형고시도도면작성등)

②  실시계획인가 도서작성·고시 및 관련부서 협의

8) 계약상대자는 실시설계 납품검사원 제출 7일 전 다음 서류를 사업 담당 감독관에게 제출하여 협의·확인하여야 한다.

가. 주요 내용

① 설계설명서 검토(분야별)

② 실시설계납품도서

③ 실시설계도면 검토

④ 발주용 내역서 검토

⑤ 공사시방서 검토

⑥ 구조계산서 검토

⑦ 물량산출서 검토

⑧ 단가 산출, 견적서 검토

⑨ 분야별 크로스 체크

나. 내역서(원가제비율)

다. 인허가용 설계도면

라. 계산서 및 물량산출서

마. 단가산출서, 견적서

9) 실시설계도서 납품 (감독관 협의 및 검토 결과 반영)

① 실시설계 검사원 [붙임 5]

② 세부 제출 도서는 제6장 참조

③ 실시설계도서 일체

④ 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

⑤ 종결보고서

⑥ 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

⑦ 설계검사원

⑧ 기타 발주기관 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

10) 기타 서류

가. 용역의 진도보고 (기술(설계)용역계약특수조건 제9조)

① 주간공정보고 [붙임 6]

② 월간공정보고 [붙임 7]

나. 설계VE 반영결과 제출 : 반영된 설계도서(예산절감내역 전·후 대비표)

다. 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

3. 업무보고 및 회의

≪계약상대자는 설계 진행 시 정기적으로 설계 진행 사항을 보고하여야 함.≫

1) 업무보고

가. 주간공정보고 : 매주 금요일 등 날짜를 지정하는 날에 붙임 양식에 의거 제출

나. 월간공정보고 : 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정 사항을 작성하여 익월 5일까지 붙임 양식에 의거 제출

다. 수시보고 : 설계용역 진행 시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시 마다 제출

2) 업무회의

가. 일반사항

- 계약상대자는 설계 진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

- 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 계약상대자 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

- 본 과업지시서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

- 계약상대자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의 장소와 참석 범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석하도록 하여야 한다.

- 계약상대자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이를 반영하여야 한다.

나. 업무착수회의

- 업무착수회의(Kickoff Meeting)는 착수일 이후 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

- 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

다. 계획설계 보고회 : 계약상대자는 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 수요기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

라. 중간설계 보고회 : 계약상대자는 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 수요기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

바. 실시설계 보고회 : 계약상대자는 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 수요기관에서 개최하여 관련 내용을 협의하여야 한다.

사. 수시회의 : 설계 진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

아. 기타 회의

- 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 설계 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 계약상대자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성·제출하여야 한다.

- 필요에 따라 회의 진행에 관한 세부 사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

자. 업무보고 및 회의내용의 기록 : 각종 업무보고 및 회의에서 협의 사항을 회의록에 작성하고 발주기관에 제출하여야 한다.

4. 녹색건축물(친환경) 설계(해당시)

국토부 고시「친환경건축물의 인증에 관한 규칙」에 따른 친환경건축물 예비인증을 취득할 수 있도록 설계하여야 한다.

5. 에너지절약형 건축물 설계(해당시)

1) 관련 규정

가. 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상부 고시 제2020-197호)

나. 건축물의 에너지절약 설계기준(국토부 고시 제2023-104호)

2) 건축물의 에너지절약 설계기준에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 에너지절약 사전협의 실시(필요시)

가. 사전협의 내용

- 에너지절약형 설계

- 고효율에너지 기자재 사용

- 소형열병합 도입 타당성 검토(필요시) 등

나. 제출서류

- 건축협의 시 제출하는 에너지절약계획서에 준용하는 도면과 근거 서류

- 공공기관 신축건물 에너지 관련 사업협의 신청서

- 고효율에너지기자재 적용 Check List

- 관련 자료 USB

- 기타 증빙서류

6. 설계의 경제성 등 검토 (설계VE)

1) 근거 규정

가. 건설기술진흥법 시행령 제75조

나. 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침

2) 실시 시기 : 기본(중간), 실시설계 단계에서 각 1회 (총 2회)

3) 시행 방법

가. 발주기관에서 별도(분리발주)로 선정한 설계VE 전문용역업체(설계감리자)가 설계VE를 실시한다.

나. 계약상대자는 설계VE 제안내용을 설계에 반영해야 한다.

4) 설계VE 활동 기간 중에 본 과업 수행자의 주요 업무 내용

가. 설계VE 준비단계에서 오리엔테이션 미팅에 참가하여 설계VE 전문용역업체(설계감리자)로부터 요구되는 정보의 유형을 파악하고 VE수행을 위해 요구되는 각종 정보를 충실히 제공하여야 한다.

나. 설계VE 분석단계 중 정보수집 단계에서는 설계VE업체에게 설계개념에 대한 정보를 제공하기 위한 발표를 해야 한다. (특히, 기술적 부분이 주요 논제가 되는 경우 설계팀의 각 전문가들도 함께 참석해서 설명할 수 있다.)

다. VE실행단계에서 발주기관으로부터의 설계VE제안서의 조치계획서를 작성하고 이를 발주기관에 제출한다.

라. 계약상대자가 만약 설계VE 제안을 거부하는 경우 이에 대한 명확하고 타당한 이유를 밝혀야 하며, 필요시 이를 위한 각종 기술적 증빙자료도 제출해야 한다. 또한 승인된 VE제안에 대해서는 즉각적인 수정 설계를 착수해야 한다.

7. 설계용역평가 대책

1) 계약상대자는 건설기술진흥법 제50조 및 건설기술용역 및 시공 평가 지침(국토교통부 고시 제2019-636호)에 따라 설계용역평가를 위한 자료를 준비해야 한다.

2) 설계용역평가 관련 자료는 요청받은 날로부터 20일 이내에 제출하여야 하며 평가 결과 미비한 사항이 발생할 경우 이를 반영한 설계 도서를 보완 제출하여야 한다.

8. 관련기관 인ㆍ허가 및 협의 등 설계심의

1) 계약상대자는 설계도서 납품 전에 관련 법규에 의한 건축협의 내용 및 각종 심의 결과를 반영한 후 납품하여야 하며, 이와 관련된 일체의 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

2) 계약상대자는 본 과업 수행 중 관계부서 및 발주기관과 수시로 협의하여야 한다.

3) 설계용역 계약자는 각종 설계심의(설계자문 포함)와 관련된 공청회나 설계심의회가 있을 시 참석하여 설명은 물론 심사 자료를 작성하고, 보완 요구사항이 있는 경우는 이를 즉시 보완 조치한다.

4) 제출된 설계도서는 협의를 거쳐 확정될 때까지의 지적사항과 공사 진행 과정에서 설계변경이 발생 되는 경우와 발주자의 요구가 있을 때는 설계용역 계약자 부담으로 즉시 수정 보완을 한다.

5) 계약상대자는 용역 예정공정표상의 공정이 5% 이상 지연되는 경우 및 건축 협의가 지연되는 경우는 그 사유 및 대책을 강구하여 문서로 발주기관과 협의한다.

9. 보안관리 대책

1) 계약상대자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 개인 또는 특정 단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2) 계약상대자는 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

가. 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다. (착수계 제출 시 설계 참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

나. 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출 시켜서는 안 된다.

다. 폐기물은 소각 처리하고, 소각 대장은 제출해야 한다.

라. 과업 수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생하는 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

10. 민원 발생 방지대책 수립

1) 증축 예정 부지 주변 건물에 일조권, 조망권 등 피해가 없도록 관련 법규를 준수하여 설계하여야 한다.

2) 민원 발생을 최소화 할 수 있는(소음, 먼지, 기타환경) 민원 발생 방지 조치를 설계에 반영하여야 한다.

제3장 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

1) 본 과업에 대한 세부시행기준(공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준)은 “국토부 고시(제2020-635호)”에 의거 기본설계 및 실시설계를 수행하여야 한다.

2) 산업통상자원부에서 새로 제정되는 KSC IEC, KSC ISO 규정을 적극 참고 반영하도록 한다.

3) 계약상대자는 과업수행계획서에 설계 시 적용할 기준 및 공사시방서를 포함하여 제출한다.

4) 본 과업의 각종 규정 및 설계기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련 규정 및 설계기준이 개정된 경우 용역 완료 전까지 수정된 최신 설계기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

- 건축법 및 건축사법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 건축물의 구조ㆍ설비기준 등에 관한 규칙

- 콘크리트구조 설계기준(내진설계 포함)

- 건설산업기본법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 산업안전보건법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 소방법, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 관련 규준 및 기준

- 산업표준화법 관련 규정 및 기준

- 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편익 증진 보장에 관한 법률

- 전기사업법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정

- 전기공사업법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 대한전기용품 안전관리법(전기용품 기술기준)

- 대한전기협회 제정 내선규정, 한국전력공사 설계기준

- 전력기술관리법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 한국산업규격(KS) 및 전기 용법 안전 관리법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 기타 정보통신부 고시 및 정보. 통신 법규

- 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 같은 법 시행령

- 폐기물관리법 관련 규정 및 기준

- 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법

- 전파법, 같은 법 시행령

- 에너지이용 합리화법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 건축물의 에너지절약설계기준

- 수도법 및 하수도법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 주차장법, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 관련 규정 및 기준

- 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서

- 국토교통부 제정 건축설비공사 표준시방서

- 국토교통부 제정 토목 관련 공사 표준시방서 및 설계·시공 지침

- 국토교통부 제정 조경공사 표준시방서

- 국토교통부 제정 건축표준 상세도

- 고압가스 안전관리법 및 도시가스사업법 관련 법규 및 기준

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

- 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법

- 녹색건축물 조성 지원법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 건설기술 진흥법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 건축서비스산업 진흥법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

- 기타 본 공사와 관련된 법규, 고시, 예규, 규정, 훈령, 조례 등

2. 설계 일반지침

1) 설계의 전제조건 및 방향

가.	설계자는 반드시 예정공사비(설계공모 지침서 참조) 설계하여야 하며, 관계 법령 및 제반사항에 대하여 면밀히 검토하여 위반사항이 없이 설계하여야 한다.

나. 납품은 계획설계, 중간설계, 실시설계도서로 구분하여 납품한다.

다. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의 사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)  하여야 한다.

라. 발주기관의 사정에 따라 공사 발주가 지연될 시 계약상대자는 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

마. 계약상대자는 건축법 등 관련 법규상 건축의 가능 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

바. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력 사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

2) 설계의 일반지침

가. 대지의 입지 조건에 적합한 합리적인 설계

- 본 사업부지 현황과 주변 현황을 고려하여 안정성 있고 조화를 이루도록 설계

- 보행 친화적 외부공간 구성 및 배치

·대지가 안정성 있도록 하여야 하며 도로, 공동구, PIT 등이 침하, 침수되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영

·동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계

나. 수요를 감안한 시설 설계

- 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 안전하고 공간 효율이 편리한 설계를 통해 쾌적한 환경을 조성

- 충분한 정보통신 회선을 반영하고 미래 지향적인 기술기준을 적용하고, 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준 적용

다. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

- 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정에 준하여 설계

- 창호, 내·외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열, 결로 방지 등을 고려한 에너지절약형 구조로 설계

- 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재 사용 및 고효율 시스템 설계

- 자연채광을 최대한 반영하고 적정 환기로 실내 환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

- 에너지절약형 및 친환경 공법·재료를 적극적으로 감안하여 친환경 녹색건축물로 계획

- 에너지 소비량이 많은 시설에 대하여 에너지 절약 및 유지관리가 쉬운 경제적인 설계를 반영

라. 환경친화적 부지환경 조성

- 신재생에너지(태양광·열, 지열 등) 이용 등 환경 친화형 설계를 위한 구상 방안을 제시하고 환경친화적 건축물로 설계하여야 함

- 합리적인 토지이용계획으로 대지 이용을 극대화하고 쾌적한 환경 조성

- 조경 포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 오수 계획, 기타 시설은 오염배출량 저감을 위한 투수성 재료 사용 등 환경친화적으로 설계하여야 함

마. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

- 건축물 및 외부공간은 건축환경 설계를 통한 범죄예방(CPTED) 기법을 적용하여 안전하고 쾌적한 환경으로 조성하여야 하며, 옥외 생활 범죄 방지 및 안전성 확보를 위해 시야를 가리는 시설물은 지양하고 열린 공간으로 계획

- 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재난에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

- 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계

- 국지성 호우에 따른 건축물의 침수 등을 대비한 배수계획을 설계

바. 안전성과 시공성이 확보된 설계

- 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제 상태와 장비 사용 중 발생하는 동적 충격 등의 영향에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

- 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조 계획이 이루어진 설계

- 구조는 철근콘크리트(RC) 또는 철골철근콘크리트(SRC) 구조로 내진설계를 하며, 기둥 간격을 적절히 배치하여 각 실의 사용에 지장을 주지 않고 효율적으로 공간 활용이 되도록 설계

사. 주요자재 사용계획

- 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 따른 고효율에너지 기자재를 사용한다.

- 인체에 유해한 물질이 함유된 자재는 사용할 수 없으며, 가능한 친환경·경제적 자재의 사용을 고려한다.

- 국내 자재 중 KS품 사용이 원칙이며, KS품이 없을 시 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

- 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재를 사용한다.

- 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

- 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적 설계에 반영하여야 한다.

- 관급자재의 선정

·국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제83조 및 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정․고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매토록 규정하고 있으며, 조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준(조달청 훈령 제2017호, 2021.12.3. 개정)」에 따라 관급자재를 선정하여야 한다.

·계약상대자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성·제출하여야 하며, 관급자재 선정을 위하여 각 자재에 대한 비교·검토 결과를 발주청에 보고하고 승인 후 관급자재를 선정한다.

3. 분야별 계획

1) 설계 세부지침

가. 에너지 절약

- 계획 시에 부지의 환경조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용 합리화를 도모한다.

- 「에너지이용 합리화법」 제3조(정부와 에너지 사용자ㆍ공급자 등의 책무) 및 「고효율에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2021-166호.)」에 의하여 고효율기자재를 사용하여야 한다.

- 「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2020-197호)」에 따른 관련 사항을 설계에 반영하여야 한다.

나. 친환경(녹색) 건축

- 친환경 기준 : 「녹색건축 인증에 관한 규칙」 / 「녹색건축 인증 기준」 (국토교통부)

- 사용 연한의 확보 : 「건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부)」

- 신·재생에너지 설비 설치 : 연도별 신·재생에너지 공급 의무비율 준수

다. 건축물 사용 연한에 관한 고려

- 사용 연한의 확보

· 계획 시에 건축물의 사용기능을 검토하여 요구되는 시설의 용도, 기능의 확보에 대응할 수 있도록 한다.

· 계획에 있어서는 장기적인 사용기간을 상정하여 사용조정 및 용도변경에도 대응 가능토록 필요에 따라 어느 정도의 융통성을 고려한다.

- 내구성의 확보

· 계획 시에 건축물의 사용 연한 내 그 기능을 확보할 수 있도록 건축구조, 설비 및 건축 비(非)구조 부재의 합리적인 내구성 향상에 노력한다.

· 건축구조(구조체)에 있어서는 건축물의 내용기간 중 대규모 수선이 발생되지 않도록 내구성 향상에 특별히 유의하고 건축설비 및 건축 비(非)구조 부재에 있어서는 건축물 사용기간 중 수 차례 대규모 수선이 필요함과 균형 있는 수선 주기를 고려하여 합리적인 내구성을 확보할 수 있도록 한다.

라. 신체장애자 등에 대한 배려

- 주차장에는 신체장애자 등의 이용이 가능한 주차장 및 통로를 설치하여야 한다.

- 보행 거리가 짧고 자동차의 교통 동선과의 교차가 극히 적은 위치를 선정하고 필요한 표시를 하여야 한다.

- 장애자 등이 이용하는 주차의 폭원에 대해서는 통상의 폭원에 1m 이상의 여유를 더하여 설계한다.

- 장애자의 통로는 기타 보행자와의 마주침을 고려하여 1.8m정도의 폭원을 확보하고, 평면 통로로 하는 것을 원칙으로 한다.

마. 비용에 대한 고려

- 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등이 제시되어야 한다.

- 각 시설에 관해 공사비의 적정한 배분을 고려한다.

- 사후 유지관리비 등의 경제성이 비교ㆍ검토되어야 한다.

사. 소음·진동·방진의 고려

「소음·진동관리법」 제23조, 제26조 및 제29조 등에 맞게 설계한다.

2) 건축계획분야

가. 기본 지침

- 설계용역의 착수 시 설계자와 모든 관계자가 당해 설계용역의 목적에 대하여 분명히 인식하고 확인을 하여야 한다.

- 현장 여건을 정확히 조사한 후 배치계획은 대지의 특성과 지역ㆍ지구 요구조건, 인접 건축물, 공개 공지, 보행자와 차량의 동선 요구조건 등과 상응하여야 한다.

- 건축물 외부 설계와 재료 마감은 건축물 형태와 조화되어야 하고, 영구적이고 내구적이며 유지· 보수관리가 용이하여야 하고, 개보수 시 기존 재료와의 일치를 고려하여야 한다.

- 내부 공간계획은 이용자와 차량의 동선이 명확하여야 하며, 기능적으로 연계되고 효율적인 배치가 가능하도록 계획되어야 한다. 또한 부적절한 서비스의 배치와 같은 간섭과 잠재적 위험이 제거되어야 한다.

- 내부 마감 재료는 건물의 특성과 공간 및 활동에 부합하여야 하고, 내구적이며 유지  보수가 용이하여야 한다.

- 각종 편의시설 및 위생시설은 사용자가 편리하고 합리적인 유지관리가 될 수 있도록 설계한다.

- 이용자 편의 증진 방안을 적극 반영하기 위해 유니버설디자인(Universal Design) 적극 반영 유도할 것

- 건물 내·외부 색상은 주변환경과 조화로운 색상계획을 수립한다.

- 층별·용도별 구분하여 공간을 최대한 활용되도록 공간 구획한다.

- 장애인이 접근이 용이한 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

- 계약당사자는 치수, 재료, 건물 구성요소의 설치와 관련하여, 현재 건설산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

나. 세부 지침

- 배치 및 동선계획

· 인접한 기존 시설과의 연계성 및 접근 효율성을 고려하여 합리적인 공간 이용이 가능하도록 배치한다.

· 주변 시설과 동선이 연계되고 조화로운 경관이 형성되도록 하며, 시각적으로 차폐되지 않도록 밝은 분위기의 건축물을 계획한다.

· 인접 건물의 조망ㆍ일조를 고려하여 피해를 최소화하도록 충분한 이격거리를 확보한다.

· 향후 수요 증가에 대비하여 융통성 있는 공간계획을 수립한다.

· 자연에너지를 충분히 활용하여 에너지 절약계획을 반영한 건물 배치를 계획한다.

· 대지 여건 및 기존 시설과 조화를 고려하여 계획할 것

· 주변 연구 및 주변 시설과의 연계성을 고려하여 출입구 위치, 주차대수 계획한다.

· 주변의 기존 건축물과 차량과 보행동선의 혼재가 예상되므로 설계자는 차량과 보행동선을 충분히 검토하여 위치를 계획한다.

· 주차대수는 법적 이상 확보하고 하역공간은 진입, 진출을 고려하여 계획한다.

· 보행자의 안전을 우선 고려하며 보차 동선의 교차는 최소화한다.

· 보행로 폭, 경사로 등은 장애인 등의 편의시설 설치기준에 적합하도록 설치한다.

· 시설 증축에 따른 외부공간과 합리적인 동선 재배치를 계획한다.

· 화재ㆍ비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 동선 및 소방 진입용 동  선 계획을 수립한다.

· 대지 내 기존 차량과 보행자 동선을 파악할 수 있는 도면(기존 평면도, 기존 배치도)을 참고하여 계획할 것

· 품 반·출입 및 시설 유지관리를 위한 서비스 동선을 별도 확보할 것

· 인접 시설 및 지하 공동구 등 기초간섭이나 구조 안정성 등을 고려하여 시공 용이성을 확보한다.

· 범죄예방설계(CPTED) 적용을 고려한다.

- 외부공간계획(해당시)

· 주변 가로경관과 사용자의 동선을 고려하여 경계부에 오픈스페이스(휴게, 녹지공간)를 조성한다.

· 시야를 가리는 시설물 설치를 지양하고 열린 공간으로 조성, 안전에 관한 설계를  최대한 반영한다.

· 주변 보도 현황 파악 및 보행자를 위한 보도 계획을 수립하여 건물 진입 공간 및 출입에 지장이 없도록 계획한다.

· 물품 반ㆍ출입과 시설 유지관리를 위한 서비스 동선, 화재ㆍ비상시를 대비한 피난 동선 및 소방 진입용 동선(소방차로)을 확보한다.

· 인근 기존 시설과의 관계를 고려하여 적절한 외부공간 및 완충공간 (다목적 광장, 휴게공간 등)을 제안할 수 있다

- 평면계획

· 환경 오염원이 발생하는 실은 이격하되 불가피한 경우 설비계획 및 마감재 선정 시 먼지, 소음, 진동, 유해물질, 냄새 등이 인접 공간으로 확산되지 않도록 할 것

· 이용자별, 시설별, 시간대별 개별 이용과 관리를 할 수 있도록 하고 보안 관리가 필요한 실은 추후 개별 보안 관리 예정이며 조닝·동선·설비(냉난방, 조명 등) 계획 시 반영할 것

· 실험실에서 발생한 폐기물의 운반·처리 동선은 별도로 계획할 것

· 재난 발생 시 피난을 고려한 동선 및 시설계획을 고려할 것

· 각 실은 실험 특성과 장비 특성(무진동, 중량 등)을 고려하여, 실의 사용 용도에 적합한 배치 및 평면을 계획한다.

· 화재 및 폭발 위험성이 있는 공간은 안전관리를 위해 이격 배치하는 등, 실별 연계 또는 분리하여 이용자의 안전과 효율성을 높일 수 있는 공간으로 배치한다.

· 실의 특성을 고려하여 가변성을 적용하며, 실험구역과 일반구역은 분리한다.

· 이용자 동선, 물품 동선, 폐기물 동선, 장비반입 동선, 비상탈출 동선 등을 고려하여 합리적인 동선을 계획한다.

· 실험장비, 중량의 물품 이동을 고려한 합리적인 계획안 도출을 위해 제원(유효 폭, 높이, 하중 등)을 고려한다.

· 전문적인 장비의 유지, 관리를 위해 장비 특성별 채광(또는 일사 차단), 환기(강제 급배기) 등의 설비를 적용한다.

· 실별 각종 부속 공간(각종 장비 및 기구 수납, 창고 등)이 누락되지 않도록 계획한다.

· 각 시설물은 중앙 집중 관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영과 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 계획한다.

· 재난 발생 시 긴급 대피가 가능하도록 단순한 내ㆍ외부 동선을 수립하며, 모든 사용자가 응급상황에 즉시 인지할 수 있도록 재난 상황 고지 설비를 수립한다.

· 건물의 이용 편의성을 종합적으로 검토하여 무장애(barrier free) 공간으로 계획한다.

· 시설 운영계획 및 실별 연계성을 고려하여 적절한 조닝ㆍ공간ㆍ설비(보안, 조명, 냉ㆍ난방 등)를 계획한다.

· 주요장비의 사양과 하중을 파악할 수 있는 자료를 검토하여 구조설계 및 반입동선을 계획한다.

· 각 실별 개별 냉.난방설비 시스템을 구성하고 일부 시설은 별도의 공조, 항온항습 설비를 계획한다.

· 필요시 각종 부속 공간(각종 장비 및 기구 수납, 창고 등)을 제안할 것

· 향후 증축 대비 각종 기계, 전기 관련 설비를 고려하여 계획한다.

- 입면 및 단면계획

· 화려하고 다채로운 컬러를 지양하고 통일성이 부여된 디자인 입면을 창의적으로 구현한다.

· 자연채광·환기가 잘 돼야 하고 경제적이고 유지관리가 쉬운 재료를 적용한다.

· 건물 외부 마감재는 변형, 변색이 적고 경제적이며 내구성이 좋은 재료를 선택하고 주변 건물과 조화로운 미관을 고려하여 계획한다.

· 에너지 절약 등 차원에서 전체벽면이 유리로 된 커튼월 구조는 지양하며 창호 면적 비율은 50% 이하로 한다.

· 외벽의 차양시설을 계획한다.

- 재료 및 색상계획의 주안점

· 사용 자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고, 내구성, 내화성, 내후ㆍ내식성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감 방법을 선택한다.

· 사용 자재는 건축법 관련 규정에 적합하게 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인    한 가연성 자재 사용 시 방염처리를 소방 관련 법령에 맞도록 설계한다.

· 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해 물질이 적은 친환경 재료를 선정하도록 한다.

· 녹색건축물 인증과 관련하여 환경친화적 제품(환경마크 인증제품) 및 우수 재활용    인증마크제품(GR마크 인증제품)을 우선적으로 사용하여야 한다.

· 로비, 홀 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜되며 미끄럼을 방지할 수  있는 재료를 선정한다.

- 기타계획

· 지역의 특성과 용도의 특성에 적합할 수 있도록 공공디자인의 요소를 반영한다.

· 건축물의 MASS, 색상, 자료 등은 기존 시설과의 조화를 고려한다.

· 주출입구, 로비, 주요 공용공간, 건물명 사인 계획 요소를 연출하고, 필요하다고 판단되는 부분을 제시한다.

3) 건축구조분야

가. 기본지침

- 내진보강 설계구조 계획은 향후 수직 증축 등이 가능할 수 있는 구조로 설계하여야 한다.

- 각종 하중에 저항하기 위한 다양한 구조시스템을 검토 후 건물의 안정성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화한다.

- 시설의 특성을 고려하여 층간 소음을 최소화하는 구조로 설계한다.

- 재난과 지진(내진설계), 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려한다.

- 장스팬(Long Span) 구조는 사용성을 고려(가변성 및 공간적 융통성)하여 합리적인 구조시스템을 계획한다.

- 주요 구조 부위 치수를 모듈화하고 건물 마감을 고려토록 한다.

(특히 계단, 경사로, 출입구 등 법적 기준 준수)

- 구조계산은 객관성이 있는 국내외 관계 규준을 적용하여야 한다.

- 구조 안전은 관련법에 따라 전문가의 확인을 받고, 사용하는 건축 재료의 품질은 관계법에 따라 공인된 것이어야 한다.

- EXPANSION JOINT 설치 시 이에 대한 방수 처리 계획은 명기한다.

- 주요부재의 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수 및 보조부재의 보강을 검토하여야 한다.

- 구조기술사가 구조 안전에 대한 안전성 검토(구조계산서 포함)를 해야한다.

나. 하중의 산정

- 고정하중, 적재하중, 적설하중 및 풍하중, 건축법 및 동법 시행령, 동법 시행규칙, 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙, 철근콘크리트구조 계산규준 및 강구조 계산규준 등에 의거 산정한다.

- 지진력은 국내 실정을 조사, 분석하고 필요시 외국의 규준 등 참고 자료 제시

- 수압 및 적정 토압을 고려하여 산정한다.

- 옥상에 태양광 등을 설치 할 경우 구조설계 시 반영한다.

다. 적용규준 및 해석

- 상부 구조설계 시 적용기준

· 구조설계에 있어 허용 응력도 설계법이나 극한 강도 설계법을 사용 시

→ 건축물의 구조 기준 등에 관한 규칙, 철근콘크리트 구조계산 규준

※ 구조 규준 적용은 동일 규준을 일관성 있게 적용하여야 하고 여러 규준의 혼용을 피한다.

- 하부 구조설계 시 적용기준

· 구조물 기초설계기준 또는 이에 상응하는 외국의 관계기준 및 연구보고서

· 지반조사 결과를 이용하여 지반조사보고서 검토 후 경제성이 있는 기초로 설계에 반영

라. 구조해석

- 해석 방법에 대한 근거를 명시(참고문헌, 적용기준)한다.

- 라멘골조나 전단벽 또는 양자 혼성구조에 있어서는 횡력 분담률을 고려하여 구조 해석을 실시, 부재 설계에 적용한다.

- 조건이 상이한 각종 부재에 대한 응력 해석을 실시한다.

- 구조체의 주단면 해석 시에는 전산 처리방식에 따라 정밀해석을 실시하고 필산(筆算)을 병행하여 검사 실시한다.

마. 구조재료 선정

- 주요 재료는 KS규정에 명시된 강도 및 제반 특성의 범위 내에서 시공성과 수급 여건을 감안하여 발주기관과 협의하여 선정한다.

- 기타 재료 및 기성제품(PC부재, 기타) 사용 시에는 재료의 물리적, 화학적 특성과 구조 안전을 증명할 수 있는 자료 또는 보고서를 첨부한다.

4) 토목분야

가. 일반지침

- 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로 및 맨홀, 구조물 또는 매설물 등에 관한 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하고 공동구 라인 등 기존 인프라 시설과 연결한다.

- 대상지 주변의 현황을 파악하여 공사에 따른 주변 구조물의 피해 예상 등을 고려하여 적정한 공법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 부지 내 지하에 매설된 제반 시설물의 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강 방법을 제시하여야 한다.

- 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제 조치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정하여야 한다.

- 공법의 선정은 대지 여건, 지층 조건, 공사 목적, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착 심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적 공법을 선정하여야 한다.

- 도로 계획은 이용자의 편의와 동선을 감안, 합리적으로 계획하고 주변 도로와의 유기적인 연결과 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치한다.

- 외부 보행로 부분에 대하여 장애인 편의를 고려하여야 한다.

- 설계 시 국토교통부 등에서 제정한 각종 공사 표준시방서 및 설계기준(최근 발행) 적용한다.

· 기본설계 등에 관한 세부시행 기준(국토교통부)

· 도로포장 설계 및 시공지침

· 하수도 시설기준(환경부)

· 상수도 시설기준(환경부)

· 구조물 기초설계 기준

· 토목공사 일반 표준시방서

· 도로공사 표준시방서

· 하수관거공사 표준시방서(환경부)

· 콘크리트 표준시방서

· 건설공사의 설계도서 작성 기준(국토교통부)

· 국도건설공사 설계실무 요령(국토교통부)

· 콘크리트 설계기준 해설(한국콘크리트학회)

· 철근 및 무근콘크리트 표준시방서

· 수량산출기준지침

· 한국산업규격 및 건설표준품셈

- 기존 공동구에서 본 건물까지 공동구를 연결하여 설비를 인입 할 수 있도록 공동구를 설계한다.

나. 대지조성

- 건축, 토목 및 기타 구조물 잔토를 대지 내에서 자체 균형을 이루도록 하고 이를 고려하여 건물 및 대지조성 계획고를 조성하여야 한다.

- 잔토 처리는 단지 내 도로경계선을 성토한계선으로 하여 조성 계획고에 맞추어 성토하며 충분한 박층 다짐을 실시하도록 설계하여야 하며, 단지 조성에 따른 토량 이동 및 정지계획은 배수계획을 감안하여 합리적으로 계획한다.

- 성토 비탈면 구배는 1:2 이상의 완만한 사면으로 계획하는 것을 원칙으로 한다.

- 부지조성 계획고 결정 후 토공량을 종, 횡단면도를 작성하여 토공량을 산출한다.

- 토공사 시 기반 시설, 기타 지하 매설물과 불가피하게 근접될 경우는 구조적으로 안전한 시공 방법을 충분히 검토하여 설계한다.

- 부지 횡단면은 20m 간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 중간에 단면을 추가한다.

- 암 발파공법이 필요시에는 지형, 암질, 주위 환경(밀집 지역 또는 기존구조물과 인접한 경우 등) 등을 고려하고 소음, 진동 및 비산방지대책은 물론 인근 구조물에 유해한 영향이 미치지 않도록 발주기관과 충분한 협의를 거쳐 적절한 공법을 선정한다.

- 원지반 또는 기초지반이 연약하여 별도의 연약지반처리공법이 필요한 경우, 공법 선정에 있어서는 그 목적에 따라 현장 조건에 적절하고 경제적인 공법을 선정하되 공법의 시공성, 안전성, 경제성 등의 비교 검토(안)을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

다. 현황측량(해당시)

- 현황측량은 본 지침서에 준하되 명기치 않은 사항은 측량법 및 같은 법 시행령 규정에 준하여 감독관의 지시에 의거 실시하고 측량이 완료되면 발주자의 확인을 받는다.

- 현황측량은 감독자가 필요로 하는 축척으로 성과도를 작성하여 제출하여야 하며, 주위 도로망 및 도시 계획선까지 기재하고 부지경계선에서 설계에 필요한 범위까지 조사하여 작도하여야 한다.

- 측량 시 기존건물의 현황은 3점 이상 시준하여 실측하여야 하며 석축, 옹벽, 담장, 전주, 하천, 구거 등을 상세히 명시하고 기타 설계자료가 될 수 있는 지형지물을 측량하여 도면화하여야 한다.

- 수준점(T.B.M.)은 부지 내 1점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

라. 토공 및 흙막이 설계

- 토공은 가급적 절ㆍ성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

- 토취장 선정 시에는 토취장의 위치, 운반 거리 등을 정확히 명기하여야 하며, 관련기관에서 정한 원상복구 의무나, 각종 훼손에 따른 보수 및 정비 등을 발주기관과 협의, 고려하여 사후분쟁의 요인이 없도록 하여야 한다.

- 사토장 선정 시에는 사토장의 위치, 운반 거리 및 차량 동선 등을 고려하여 경제적인 설계가 되도록 하고 관련기관 및 발주기관과의 협의 등을 거쳐 가장 최적의 장소를 선택하고, 설계도서에 위치와 거리, 이동 방향 등을 명시한다.

- 계약상대자는 토공 설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반 거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

- 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성(Trafficability)을 확보토록 한다.

- 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지반조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지반조사 결과 또는 관련 전문 서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용 근거를 첨부하여야 한다.

- 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치 수량 등을 설계 내역서에 반영하여야 한다.

- 흙막이 설계는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법 선정은 반드시 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

마. 구내 우ㆍ오수관 설계

- 우수ㆍ오수에 대한 계획은 부지 내ㆍ외부 지형 조건을 고려한 배수계획이 되어야 하며 폭우나 홍수 등에 대비한 처리 계획을 수립한다.

- 환경부 제정 하수도 시설기준과 배수시설을 충분히 조사한 후 우ㆍ오수량 추정과 배수방식 및 유량계산을 실시하여야 하며 설계 및 사업 시행에 차질이 없도록 관계기관과 사전협의에 철저를 기하여야 한다.

- 배수시설은 우ㆍ오수 분류식으로 계획하고, 우ㆍ오수 교차부분은 오수관로가 우수 관로보다 가급적 깊게 하고 동일관로로 계획하여 간선 배수시설까지 분류식으로 연결하여야 한다.

- 관거는 가급적 직선으로 부설하고 굴곡부는 예각 및 직각으로의 접합을 피하며 침하되지 않도록 설계한다.

- 단면 결정 시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150∼200mm이상이 되도록 하며, 소켓식 흄관 또는 동등 이상의 성능을 가진 관종을 비교 검토하여 설계에 반영한다.

- 두 개의 관이 합류하는 경우 중심 교각은 60° 이하로 한다.

- 관거 접합의 맨홀에 있어서는 하류관거를 상류관거보다 2㎝이상 낮게 부설한다.

- 관거 내의 토사 침전과 세굴을 방지하기 위하여 관거 구배는 관내 유속을 1.0～1.8 m/s 정도로 유지할 수 있는 적정구배를 유지함을 원칙으로 하고, 상기 기준에 미달되거나 초과 시 감독공무원과 협의 처리하되 우수는 0.8～3.0m/s, 오수는 0.6～3.0m/s 범위를 초과할 수 없다.

- 우수맨홀 뚜껑은 차도에서는 주철뚜껑을 사용하고 보도 및 녹지에는 보도 포장재와 조화되는 재질의 뚜껑으로 하고 오수맨홀의 경우에는 밀폐된 주철제 뚜껑을 사용한다.

- 오수받이는 우수가 유입되지 않도록 밀폐된 뚜껑을 사용해야 한다.

※ 오수 맨홀의 바닥에는 반드시 Invert를 설치하여 오수의 흐름이 원활하도록 설계한다.

바. 상수도(건물 외 부지)

- 인접 건물의 상수도 라인을 조사하고 가급적 기존 상수도 라인에서 분기하여 사용하는 방안을 검토한다.

- 수도법 및 관련 법규와 해당 관청의 급수조례 등을 준수하여 설계에 적용한다.

- 급수량은 1일 1인당 시간 최대급수량, 화재 시는 계획1일 최대급수량으로 산정한다.

- 급수관로의 분기점에는 적절한 위치에 저수밸브를 설치하여 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

- 수압작용으로 인한 급수관의 이탈방지를 위해 Φ=80㎜ 이상의 주철관 변곡 부위에는 콘크리트로 보강한다.

- 급수관의 재질은 시공성, 경제성, 내구성 등을 비교하여 최적의 급수관로를 선택한다.

- 급수관로의 매설깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 산정한다.

- 급수관로 자재는 다음 각호에 해당되는 자재를 사용한다.

· 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 제품

· 「산업표준화법」 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로 같은 법 제25조에 따른 우수한 단체표준제품

· 「산업표준화법」 제27조제2항에 따른 단체표준인증을 받은 제품으로 법 제56조에 따른 한국상하수도협회가 인증한 제품

· 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조에 따른 환경표지의 인증을 받은 제품

· 「산업기술혁신 촉진법」 제16조에 따른 인증을 받은 제품

· 「나노기술개발 촉진법」 제6조에 따라 신기술의 인증을 받은 제품

· 그 밖에 환경부 장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품

사. 주차계획

- 주차장법, 건축법 등을 고려하여 합리적으로 계획하여야 하고 유도설비 등의 충분한 설치를 통해 보행자의 안전을 확보한다.

- 장애인ㆍ임산부 주차면은 출입구 인근에 배치하여 사용에 지장이 없도록 계획한다.

- 주차장은 보행자 동선의 교차를 최소로 하고 사용자 이용이 편리한 위치에 계획한다.

- 차량 진ㆍ출입의 주차 동선을 계획함에 주변 도로망 등을 고려하여 교통의 흐름을 방해하지 않는 합리적이고 원활한 계획을 반영한다.

- 화재, 방재 시 긴급 피난ㆍ구조를 위한 차량 등의 진입 공간을 계획한다.

아. 기타계획

- 부지 경계 부근은 도로, 인접 토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

- 외부 바닥, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용한다.

- 폐기물 처리는 반드시 관련 법규에 맞게 친환경적으로 처리하여야 하며, 환경기준에 맞게 재활용을 극대화하여 자원을 절약하도록 하여야 한다.

5) 조경분야

가. 일반지침

- 조경분야 설계는 조경 설계기준 및 조경공사 표준시방서 및 규칙·지침과 건축조례 등 기타 관련법 및 규정을 적용 설계한다.

- 조경시설물과 식재 계획은 대지와 건축물이 안정감 있는 경관을 이룰 수 있도록 하며 건축물의 형태 및 색채, 재질과 유기적으로 조화되도록 계획한다.

- 녹지 확보 및 환경미화, 환경보호, 환경개선의 목적 구현에 적합하도록 설계한다.

- 산업공해의 완화, 생활환경의 개선, 방화, 방재, 안전성 등에 적합하도록 설계한다.

- 조경 및 녹지계획은 대지 주변 현황분석 및 기본계획에 의하여 계획하여야 하며, 건물과 주변 환경이 전체적인 조화를 이루도록 한다.

- 건축물 용도 및 기존 시설과의 연계성·접근성을 고려하여 충분한 녹지공간으로 조성하되 구체적인 특성(ex.어울림광장, 주제정원 등)을 제시하고 외부공간 디자인을 배려하여 계획하여야 한다.

- 차량 동선 및 보행자 동선 등을 고려하여 적절한 녹지공간을 계획하여야 한다.

- 주요 자재원을 선정 검토하여 설계 반영하여야 한다.

- 조경설계 시 옥상 조경은 반영하지 않는다.

- 현장조사 및 실측

· 식생·생물상·토양 등을 조사하여 식재 설계 방향을 설정한다.

· 구조물 및 관련되는 지장물(지상, 지하 매설물)을 조사하고 안정성을 검토한다.

· 현황측량 성과와 현황을 비교 검토하고 변경, 누락사항이 발생 시 실측으로 보완하여야 한다.

- 표토 및 지장 수목 조사

· 표토는 식재지반조성을 위한 중요한 재료이므로 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과 보관을 위한 대책을 수립하여야 한다.

· 부지 내 지장수목 전수조사 결과와 처리방안, 표토보존방안, 토양조사 분석종합결과와 개선방안 및 그에 따른 수종 선정 검토과정을 제시하여야 한다.

· 식재 공사에 적합한 표토는 반드시 수거하여 재활용하도록 반영한다.

- 기타 조사사항

· 주변 시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

· 계획 대지 인근에 문화재 및 주요 시설물이 있는 경우 정확히 조사하여 관련기관과 협의 후 설계에 반영하도록 한다.

- 디자인, 식재 계획, 외부 시설물 등의 합리적인 설계안을 제시하고, 외부공간은 친환경공간으로 조성한다.

- 대상지 주변 자연환경 및 특성 등을 고려하고, 자연 지형을 이용하여 계획하여야 하고, 가능한 기존 수목을 이용하도록 한다.

- 주민과 건물사용자가 친근감을 가지고 접근할 수 있는 휴식 공간을 제공한다.

- 전체이미지와 공간별 이미지에 부합되는 시설물의 형태 및 재질, 색상 등을 고려하여 수목은 주변 식생과 조화될 수 있는 수종을 도입한다.

· 자연 친화적인 환경을 구현할 수 있는 수종 선정

· 계절별 변화감을 주고 수형이 아름다운 수종 선정

· 구입이 용이한 시장성 있는 수종 및 유지관리가 용이한 수종 선정

- 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

- 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적인 재료를 사용하여야 한다.

6) 기계설비분야

가. 기본지침

- 일반사항

·각 실의 용도에 적합한 설비를 계획하여 쾌적성, 위생성, 경제성, 유지관리성 등이   확보되도록 한다.

·효율적인 설비설계로 최고의 기능 발휘와 경제성이 조화를 이룰 수 있어야 한다.

·설비시스템은 가능한 단순하게 함으로써 유지관리의 편의성, A/S의 원활성, 조작의 간편성 등을 고려하여 설계한다.

·층별 및 사용처 개소마다 점검구를 충분히 설치하여 유지·보수 등에 용이하도록 한다.

·동파방지, 침수방지, 방식 및 방청, 방음 등을 고려하여 설계하여야 한다.

·기계실 및 열원기기 등은 각 건물에 분산 또는 통합 설치하며, 자동제어설비는 기계, 전기, 통신, 소방 등 통합감시제어가 완벽하게 이루어질 수 있도록 검토한다.

·기자재 사용은 고효율에너지 기자재(고효율유도전동기 외)를 선정하여야 한다.

· 기계설비에 대한 요구조건은 시설별 면적구성을 참조할 것

- 외기 온도 조건

·건축물의 에너지절약설계기준(최근 국토교통부고시)을 적용하여야 한다.

- 공기조화설비 실내 설계기준

·실내 온ㆍ습도 및 공기 청정도 기준은 용도별 특성을 고려하여 적용한다.

- 건축물 각 부위의 열관류율 기준

·건축물의 각 부위의 열관류율 기준은 건축물의 에너지절약설계기준, 고효율에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정을 적용한다.

- 배관자재의 사용기준

·한국산업규격(KS규격) 및 동등 이상의 배관 선정

·공급된 실적이 많아 사용 및 유지관리에 어려움이 없는 것

·내식성 및 내구성이 좋은 것

·내산성 및 내약품성이 우수한 재질

·유지보수용 자재의 확보가 용이한 것을 적용

- 각종 시설은 중앙 집중관리 및 통제가 용이하며, 최소 인원으로 운영ㆍ관리가 가능하도록 설계하고 준공 후 유지관리가 간편하고 에너지 절약적인 시스템을 채택한다.

- 대기오염, 소음 및 진동 등의 공해에 충분히 대응할 수 있는 쾌적한 실내 환경의 조성을 고려하여 공간별로 제어 가능한 최적의 공조시스템으로 설계한다.

- 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방안 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

- 전기, 수도, 하수 등 기반 시설의 공급 계획이 확보되어 추가적인 시설의 공사가 없도록 하여야 한다.

- 장래 증설이나 변경․개보수에 대한 적응성이 있어야 한다.

- LCC(Life Cycle Cost)를 고려하여 초기 투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 할 수 있는 설비방식을 고려한다.

- H.V.A.C. 설비, 위생 설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요 장비는 설계 전 반드시 발주자의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

- 신에너지 및 재생에너지 개발. 이용. 보급촉진법에 의한 적정 에너지 반영 및 설치계획 마련하여야 한다.

- 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하며, 상시 사용공간이 아닐 경우 별도의 조절기구를 설계에 반영하여야 한다.

- 향후, 건물 유지관리가 용이하며, 냉난방에 유리한 외부 설계를 계획하여야 한다.

- 환기구는 외기의 역류 및 눈·비가 들어오지 않도록 하기 위한 개폐장치, 후드(Hood) 등을 설치한다.

- 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 시스템을 채택하고 초기 투자비 및 운전비를 고려하여 계획한다.

- 추후 확장성 및 변경 대응성을 고려한 시스템을 계획한다.

- 에너지절약형 건물을 위한 고효율인증 기자재 및 에너지절약형 설비시스템을 채택 계획한다.

- 신·재생에너지 설비 의무 설치대상으로 건립 부지 지반 여건 및 인접 건물, 식생 상태 등을 감안하여 태양광, 태양열, 지열, 연료전지 등 경제성, 효율성 검토하여 반영하도록 하며, 신·재생에너지를 지열로 계획 시 천공부지에 대하여 현장조사 후 실제 시공에 어려움이 없도록 계획한다.

- 신·재생에너지 반영을 위하여 옥상에 태양광 등을 설치 할 경우 외부의 경관을 해치지 않도록 위치를 선정하여야 한다.

- 모든 사용자가 응급상황에 대해 즉시 인지할 수 있도록 재난 상황 고지 설비를 계획한다.

나. 세부지침

- 기계설비 설계 관련 신기술 도입, 친환경을 고려한 설계, 시공으로 합리적인 시설이 되도록 하며, 본 계획서 및 정부의 에너지 수급정책과 에너지 절약, 환경오염 방지 등을 적극 수용하여 설계 및 시공이 되도록 계획하여야 한다. 또한, 기계설비 설계ㆍ시공은 본 안내서 및 국토교통부 제정 건축 기계설비공사 표준시방서 및 전문시방서에 적합하게 계획되어야 한다.

· 쾌적한 실내환경

각 실의 용도에 적합한 냉ㆍ난방시스템 계획

실 특성을 고려한 환기 방식 선정

소음 및 진동의 최소화 계획

· 경제적이며 효율적인 설비계획

에너지 분석에 의한 경제적인 시스템 선정

효율적인 기기 운용 시스템 계획

부하산정의 적정성

효율성 및 경제성을 고려한 설비계획과 대체에너지(태양열, 지열 등)의 이용 가능 여부 검토

· 환경친화적 설비

수질오염, 대기오염의 억제나 방지 등에 대한 대책을 고려하여 주변 환경오염 방지

자연조건(자연채광, 자연환기 등)의 적절한 이용 검토

친환경 상품 구매촉진에 관한 법률에 의거 친환경 상품을 계획

· 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

장비 및 배관보수 공간의 충분한 확보

시스템의 단순화로 보수ㆍ유지관리 및 점검이 용이하고 장래 증설, 변경 및 개보수 고려

신뢰성 높은 장비 선정 및 설치

주요 설비에 대한 생애주기비용(LCC)분석, 유지보수, 장래의 설비변경, 에너지 절약 설계기준을 고려한 경제성 검토

· 관계 제 법규의 규정을 준수

건축법, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

소방법, 소방기술기준에 관한 규칙

에너지 이용 합리화법, 열사용 기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준

장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률, 승강기 안전관리법

물환경보전법, 수도법, 고압가스 안전관리법, 도시가스 사업법

건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부 고시 제2023-104호)

고효율에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2021-166호)

녹색제품 구매촉진에 관한 법률

전문시방서(건축기계설비공사)

기타 본 공사와 관련된 법규, 영, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 조례 등

신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정

다. 냉·난방 및 공기조화설비

- 실 용도에 적합한 냉․난방설비로 검토·계획한다.

- 공기조화방식은 실별 부하특성, 온도, 습도, 기류, 풍량, 청정도 등을 고려하여 각 용도별로 유지관리, 에너지 절약 면에서 최적의 공조방식을 채택한다.

- 기존 시스템을 분석하여 용도별, 시간대별에 따라 조닝(Zoning)을 분리하여 적합한 공조방식을 채택한다.

- 공조기 코일 및 옥외 노출배관 등 동파의 위험요인이 있는 곳에는 동파방지 대책을 강구한다.

- 기기 배관 및 덕트는 국토교통부 제정 □건축기계설비공사 표준시방서□ 및 전문시방서 등에서 정하는 보온두께 이상 또는 그 이상의 열 저항을 갖는 단열재로 보온하여야 한다.

- 소음·진동의 발생원이 되는 공조설비·기기류에 대해서는 실내의 환경악화를 초래하지 않도록 설계하여야 한다.

- 배관, 슬리브 계획 시 건축구조의 검토 확인 후 설계에 반영한다.

- 개별식 냉·난방기는 설치할 수 있는 구조와 공간, 동력, 배수 등을 고려하여 계획하여야 한다.

- 냉·난방시설은 냉·난방 시스템을 적절히 검토(초기 투자비, 유지관리비용 등)하여 최적의 시스템으로 계획한다.

라. 환기설비

- 환기설비는 실 특성을 고려하여 자연환기 또는 기계환기(1종, 2종, 3종)로 하며, 공조설비와 조화되도록 한다.

- 환기설비는 용도와 경제성 등을 고려하여 환기횟수를 결정한다.

- 습도가 많은 곳의 배기 덕트는 STS 재질을 사용하여 단독 배기로 설치하여야 하며, 각 실의 냄새가 확산되지 않도록 계획한다. 단 화장실 배기덕트의 재질은 PVC 계통의 재질 사용도 가능하다.

- 화장실의 환기는 취기를 신속히 배출할 수 있어야 한다.

- 환기시설 및 강제 배기 시설 설치로 원활한 환기를 도모하며 에너지절감을 위하여 열교환기 설치 등을 고려한다.

- 다중이용시설 등의 실내공기질 관리법 제6조의 규정에 적합하게 공기정화설비 및 환기설비를 계획한다.

마. 위생설비

- 급수, 급탕, 위생 설비에는 최신형 절수형 기기를 채택한다.

- 에너지 절약과 안정적인 급수공급방식 채택한다.

- 보수, 유지가 쉽고 위생적인 재질을 선택 사용하여야 하며 소음이 적고 결로 및 동파방지를 고려한 시스템을 선정한다.

- 건물내부 오ㆍ배수는 가능한 자연배수 되도록 설계한다.

- 장애인 화장실 위생기구는 장애인 관련법에 의한 설치기준을 준용한다.

- 정화조내의 적정 환기설비를 채택한다.

- 각층별로 음수 시설을 계획해야 하며, 실내 오, 배수, 폐수 환기시설로 인한 실내 악취 유입되지 않도록 계획한다.

- 설비(급수, 배수, 오수, 폐수, 환기설비, 가스등) 인입 및 연결계통을 충분히 검토하고 관련된 기계실, 피트, PS, 천장고 등을 유지관리 부분 및 향후 장비 증설까지 고려하여 합리적으로 계획한다.

바. 방음ㆍ방진설비ㆍ시운전 계획 등

- 각종 장비 및 설비로부터 발생되는 진동, 소음으로부터 건물 구조, 재실자의 피해를 줄이기 위하여 방진, 방음시설을 계획한다.

- 장비별 시운전 및 종합 시운전 계획을 구분하여 상세히 작성한다.

- 고압가스 및 위험물 등 관련 규정에 적합한 시설로 계획한다.

7) 전기설비분야

가. 설계 기본방향

- 건축, 기계 등의 타 공정과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하고 품질 향상을 위하여 가능한 본 지침 수준 이상의 품질이 확보될 수 있도록 계획한다.

- 수배전반 및 예비전원설비는 중앙제어 및 감시가 가능하도록 계획한다.

- 전력공급의 안전성, 신뢰성, 기능성, 유연성, 경제성 등을 고려하여 계획한다.

- 전기 공급은 비상시 전기 공급이 가능하도록 기존 전력공급계통을 충분히 검토하여 가장 적합한 방법으로 계획한다.

- 저압배전반·분전반 등은 용도별, 부하별로 구성하고 실험실 등은 실별 별도 설치 계획한다.

- 전등설비는 관련규정에 의한 기준조도 이상을 반영하여 LED등기구 고효율형으로 계획하며, 책상용 콘센트 등은 대기전력 자동차단기능형으로 계획한다.

- 건물에 정전 발생이나 사고 발생으로 상시전력이 공급되지 않을 때 비상전원을 공급할 수 있도록 계획한다.

나. 기본지침

- 계약상대자는 현장조사 등을 면밀히 실시하여 시설부하, 수전용량 및 한전 인입점을 판단하고 경제적인 수전방식과 인입케이블의 굵기 산정 등을 설계에 반영하여야 한다.

- 안정성, 경제성, 신뢰성, 에너지 절약 등을 고려하여 양질의 설계가 되도록 한다.

- 용역 완료 시점에서 관계 법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

- 유지보수 등 관리가 용이하여야 하고 향후 증설, 변경 및 개·보수에 대한 적용성이 있어야 한다.

- 각종 부하용량은 향후 확장을 고려한 용량으로 산출하여야 한다.

- 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련 도면에 명기하여야 한다.

- 고압 수전 시 유지관리를 위한 예비품 및 공구 목록을 작성하여야 한다.

- 설계도서 및 공사시방서는 전문시방서(건축전기)에 따라 작성하여야 하며, 시공 시 공인기관 시험을 필요로 하는 자재 등은 목록을 작성하여 시방서에 명기하여야 한다.

- 본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

- 건축계획에 의한 실별 특성에 적합한 전기용량 산정을 위하여 유사사례를 충분히 조사하여 설계에 반영한다.

- 실내에 설치되는 조명 및 전기기구는 가변성을 고려하여 계획한다.

- 자재(도급 및 관급)는 특정 제품, 특정 사양을 반영해서는 안 된다.

다. 설계지침

- 수변전설비(비상발전기 포함)

·수전설비의 용량산정은 수용률, 부등률, 부하율 등을 충분히 고려하여 선정

·변압기 용량 결정 시 각종 시설의 부하밀도 및 장래 부하설비 증설을 고려하여 결정

·전력수급 지점은 현장을 충분히 조사하고 한전과 협의 후 결정

·수변전설비의 회로 구성은 안전성, 경제성, 실용성 등을 고려하여 구성

·피뢰설비 및 접지설비를 관련 법규 및 규정에 적합하도록 검토 시행

- 전력간선설비

·각층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점에 설치

·간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락 시 허용전류, 단락용량계산서, 접지저항 계산서 등을 고려하여 결정하고 관련 자료를 제출

·간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비의 증설을 고려하여 간선의 구성 및 용량을 결정

·배전전압은 3상 4선식 380V/220V로 계획하고 간선의 길이는 가급적 최단거리 계획

·각 방화구획을 관통하는 선로에 대한 방화구획 설정 방법을 도면에 명기하고 일위대가를 구성하여 설계서에 반영

- 동력설비

·동력제어반과 각 기기의 평면배치는 조화성을 고려

·진동하는 기기의 배관에는 가요 전선관을 사용

·동력배관은 설비배관의 증기 및 고열로 인하여 피해가 없도록 배관 이격거리를 고려하여 설계

·제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분토록 고려

- 조명설비

·전등설비는 효율이 높은 광원과 조명기구를 선택하고 스위치 회로를 세분화함으로서 에너지 절감 효과를 갖도록 한다.

·「에너지이용 합리화법」 제13조 규정에 의한 「고효율에너지 기자재 보급 촉진에 관한 규정」에 적합한 설계를 하여야 한다.

·창측 조명은 별도의 점멸스위치 회로를 구성하는 등 에너지 절약을 고려하고 각 구역별 패턴별로 구분하여 중앙조명제어반에 의해 점멸이 가능하도록 구성 검토.

·매입 조명기구의 설치 위치에 타 설비 또는 덕트배관 등 장애물을 감안 건축 층고 높이 설계 시 천장부분의 충분한 설치 공간을 협의하여 확보할 것.

·가급적 조명기구 종류를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재확보의 편의성을 고려할 것.

·옥외 보안등은 조경과 건축물 주변 여건 등 미관을 고려하여 설계할 것.

·비상조명은 한전 전원 정전 시 건물 전 지역에 소방법상 필요한 요구 조도를 확보하고 상시겸용으로서 발전기비상전원을 공급받을 수 있도록 실시한다.

·모든 조명기구(실내, 실외)등은 LED조명(KS, 고효율)을 사용한다.

- 전열설비

·각 실의 사용 기자재(용량, 3상여부 등)를 정확히 파악 실별, 용도별로 구분하여 전원이 공급되도록 할 것.

·일반용의 수구는 220V 접지형을 사용할 것.

·수구의 사용전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분하여 사용이 가능하게 분류할 것

·수구부하의 용량값은 150VA/ EA로 하며 분기회로는 용량의 80%를 초과하지 않도록 할 것.

- UPS시설(무정전시스템)

·각 실의 무정전 전원이 필요한 부분에 대하여 시설 검토할 것.

·국부적인 온도상승이나 직사광선 등에 영향을 받지 않도록 위치 선정 검토.

- 소방설비

·소방법령 및 건축법령 등 기타 법령에 정해진 제반 설비(자동화탐지설비 등)를 검토하여 설치.

·비상방송을 겸한 방송설비는 화재수신기와 연동하여 비상시 상용방송을 차단시킬 수 있는 회로를 구성할 것.

·유도등 및 유도표지의 설치대상과 장소가 적합하게 할 것.

·유도등 간의 배선은 3선식으로 하며 배선은 내열전선을 사용토록 할 것.

·비상조명등 설치 대상 중 면제 또는 누락 부분에 해당되는지 여부를 확인할 것.

·감지기는 실의 규모에 따라 적합한 감지기를 사용.

·계단, 복도의 통로 유도등은 피난 방향 표시.

- 전력/조명 자동제어

·전력제어 시스템의 중앙감시반은 조명제어 시스템과 공유하며 전력제어용 중앙감시반에서 모든 조명제어가 이루어져야 함.

·에너지 절감 및 관리 인원의 최소화가 되도록 구성.

·중앙집중제어방식과 층별, 용도별, 시간대별로 제어가 가능하도록 최적의 시스템 구성.

- 기타

·피뢰설비

·접지설비

- 옥외 조명설비

·옥외 조명등은 LED조명 에너지절약형으로 계획한다.

·외등의 점멸 방식은 GPS방식으로 하되 수동 및 자동점멸이 가능하도록 하여야 한다.

·조명등 폴은 주변 경관에 적합한 형태로 앵커볼트가 지중매입 되도록 계획한다.

·조명등 폴의 기초는 견고히 하고 개별접지(접지봉 설치)와 공통접지를 함께하고    선로는 지중매설 시공토록 계획한다.

- 신ㆍ재생에너지설비

·「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 및 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 등 신·재생에너지 관련법령에 따라 신·재생에너지 설비를 검토하여야 하며, 검토된 신·재생에너지 설치를 위해 에너지관리공단 신·재생에너지센터 설치계획 심의 등 신고업무까지 수행하여야 한다.

·승강기는 관계 법령에 적법하게 설계하고 15인승 승강기 최소2대 이상 계획하고 이중 1대는 장애인겸용으로 계획한다.

·구조계산서를 첨부하여야 한다.

8) 정보·통신분야

가. 설계 기본방향

- 본 설계지침은 정보·통신설비 설계에 대한 기본적인 사항을 기준한 지침으로 설계자는 본 지침을 준수하여야 하며, 정보화시대에 능동적으로 대처할 수 있는 정보·통신시스템을 도입하여 정보·통신서비스를 제공받을 수 있도록 계획한다.

나. 기본지침

- 본 설계는 기존 정보·통신설비의 활용 여부를 조사한 후 시공관련 설계기준을 제공하여 설계업무 표준화와 효율을 지향하고 운용 및 확장이 용이하도록 하여야 하며 초고속 정보통신망 접속을 계획한다.

- 용역 완료시점에서 관계 법령(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

- 본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 하고, 주요 자재 및 공법에 대하여는 시방서에 시험방법 및 시공법 등 정확한 시방이 제시되어야 한다.

- 외국산을 사용하는 경우는 사전에 발주기관의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련 KS규격 이상의 제품으로서, 사후관리의 편리와 보수·교체가 용이한 것을 사용하도록 하여야 한다.

- 공종별 복합시공이 요구되는 사항은 분야별 시공 범위를 명확히 구분하고 관련 도면에 명기하여야 한다.

- 유지관리를 위한 예비품 및 공구 목록을 작성하고 공사비에 반영한다.

- 본 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

- 통신설비 설계는 TTA표준(한국정보통신기술협회) 및 KICI(한국정보통신산업연구원) 기준을 준용한다.

- 행정안전부와 TTA표준에 준한 통신설비 해킹지점 감시대책과 운용·관리 스마트화 방안계획 수립하여 반영한다.

- 통신케이블(코드) 등은 광신호 탭핑(Tapping)이 차단되는 해킹 방지용 적용 한다.

- LAN설비는 우리 대학교의 기존 광케이블 설비와 호환성을 감안하여 적절한 설비로 구성하여 계획한다.

- 통합방범설비 및 소방설비와 연계된 비상방송설비를 계획한다.

다. 설계지침

- 전화(통합배선) 설비

·일반전화 또는 모사전송기 등이 필요한 개소를 파악하여 일반전화 UNIT 및 배선을 설계하여야 한다.

- 방송설비

·기존 설비의 재활용 여부를 검토 후 발주기관과 협의하여 구내방송설비를 계획하여야 한다.

·비상 방송설비는 일반방송과 겸용으로 구성하며, 화재 시 비상방송이 우선이 되도록 계획한다.

- 인터넷 인프라 구축

·증축 공간을 포함 인터넷 사용 가능한 장소를 검토하여 인프라를 구축한다.

- CCTV 설비

·사용자의 의견을 청취하여 필요시 CCTV 설치를 고려한다.

·화소수 41만 화소 이상이며, 최저조도가 0.001 LUX 이상의 카메라로 주·야간 구분 없이 최적의 화상을 제공하도록 구성하여야 한다.

- 기타 정보통신 설비

·건축계획 및 기능에 적합한 정보 통신설비를 계획하여 설계에 반영한다.

- 모든 정보통신설비는 신뢰성·기능성·안전성·경제성·확장성·에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종 등을 종합적으로 고려한다.

- 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유로운 설치를 고려한다.

- 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로설비, 이동통신 구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 시공과 사용에 지장이 없도록 계획한다.

- 통신 인입 관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련기관과의 협의를 통하여 설계 및 시공과 사용성에 지장이 없도록 한다.

- CCTV 설비와 출입통제시스템 등 통합방범설비를 계획하여 상주인력이 있는 실 및 종합상황실에서 감시가 가능하도록 계획한다.

- 보안(출입 차폐, CCTV 등)설비, 정보통신(전산, 서버, 전화, 방송 등)설비 등 중앙관리가 필요한 경우 관리구역에서 전체 운용·(시스템 조작) 관리 될 수 있는 설비 및 공간이 마련되어야 한다.

- 일반전화는 IP전화를 사용할 수 있도록 통신장비 및 선로를 계획하고, Fax 라인은 일반전화 케이블로 인입하며 실의 특성에 적합하게 계획한다.

9) 소방분야

가. 기본지침

- 소방설비 설계는 초기 화재감지, 초기 화재진압, 화재피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선으로 하며, 각종 기기의 성능, 유지관리ㆍ보수용이, 안정성 및 비용의 최적화를 기한다.

- 소방설비의 설계는 가장 최근의 국내 소방 관련 법규에 따라야 하며 반드시 관할 소방서와 협의한다.

- 소방 관계 법령(소방시설공사업법, 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 및 소방방재청 고시 각종 □화재안전기준□등)에 적합하게 계획한다.

- 화재로부터 시설과 인명을 충분히 보호할 수 있도록 소방설비를 계획한다.

- 자동화재탐지설비, 피난설비는 가장 최신의 고성능 제품으로 계획한다.

나. 설계범위

- 소화설비

·소화설비의 적용 범위 기준에 따른 기기 적정용량, 대수, 형식 결정 등

- 경보설비

·R형, P형 수신기 및 기타 발신기 비교검토

·감지기 기종에 관한 비교검토 등

- 피난설비

·용도 및 장소별 피난 대책 검토

·유도등 및 통로 유도등 설치에 관한 대책 등

- 소화용수설비

- 소화활동설비 등

다. 설계지침

- 기계분야

·소방 법규, 소방시설의 설치 규정 및 위험물 제조소 등의 설치기준에 부합하도록 설계한다.

·화재 시 인간의 행동 특성과 피난 동선을 고려하여 소화설비를 적정하게 배치한다.

·건축물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합한 시스템을 채택한다.

·소방시설은 건물의 용도 및 규모와 소화 대상물에 적합하게 조합하여 설계하도록 한다.

·각 설비는 중앙방재센터에서 조작 및 감시, 유도가 가능하도록 한다.

- 건축 및 소방 관련 법령 및 규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

- 건축ㆍ토목ㆍ전기 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하여 계획하고, 특히 증설되는 시스템을 고려하여 유지관리에 문제가 없도록 고려한다.

- 방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어가 될 수 있는 시스템으로 계획한다.

- 유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고, 보수점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하며, 향후 증설(용량증가) 및 장비의 반·출입 통로 등에도 대비할 수 있게 계획한다.

- 전기분야

·소방법에 정해진 전기분야 소방설비(자동화재탐지설비 등)를 검토하여 설계한다.

·수신기와 연동하는 회로를 구성한다.

- 소방 간선계통도 템퍼 스위치, 압력스위치, 발전기 기동, 저수위 경보 등을 설계에 반영한다.

·소방설비 전원회로의 배선은 내화배선에 의하여 설계한다.

·화재수신기는 상시 사람이 근무하는 장소(수위실, 방재센타 등)에 설치한다.

·유도등간의 배선은 내열전선을 사용한다.

·유도등(피난구, 통로)은 실용도 및 소방법에 적합한 규격을 알맞은 장소에 설치한다.

·감지기는 연기감지기, 정온식, 차동식 및 기타 소방법 규정에서 정한 적합한 감지기로 설치한다.

·방화구획을 관통하는 경우는 관통부로 화재의 화염, 열, 연기가 이동하지 않도록 설계한다.

·화재 수신반 전원은 단독으로 설계 반영한다.

- 전기설비는 최적의 시스템으로 안전성ㆍ경제성ㆍ확장성 등에 중점을 두어 계획하고, 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 고려한다.

- 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 의한 신·재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템을 계획에 반영한다.

- 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비 마감과 조화가 되게 하고, 고효율 LED 조명의 사용을 고려한다.

- 건축물과 옥외공간과 주변 환경을 연계한 경관조명시설을 계획하며, 필요한 조도를 확보하고, 조명기구의 디자인 및 설치장소에 대하여도 종합적으로 고려한다.

4. 설계진행 시 유의사항

1) 계약상대자는 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전 협의·승인을 받아야 하며, 사전 협의 결과서를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 신․재생에너지설비의 지원 등에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2022-175호, 2022.10.21.)에 의거 신․재생에너지로 지열을 설계 시 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서를 학교에서 기존데이터(폐쇄형, 개방형)를 제공한다.

3) 설계는 현황측량을 실시하여 측량성과도를 기준으로 진행하여야 하며, 대지경계측량이 필요한 경우 지적공사에 측량을 의뢰하여 성과도를 제출하여야 한다.

4) 계약상대자는 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당 기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설 방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

- 공공시설물, 전기/통신/상․하수도 시설물 및 기존구조물, 기타 시설물

5) 계약상대자는 상수도 기존 인입관로를 조사하여, 합리적인 최단거리로 설계에 반영한다.

6) 계약상대자는 사업 대상부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

7) 계약상대자는 부지 경계 부근의 도로, 인접 대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련 내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

8) T.B.M(가 수준점)을 부지 내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

9) 계약상대자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 토석정보공유시스템을 활용한 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다. 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토·반영하여야 한다.

※ 면밀하게 사전조사를 실시하여 내역에 반영하여야 함.

10) 계약상대자은「건설현장 축중기 설치지침(국토부 훈령)」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

- 축중기 의무 대상 : 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 공사

- 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 축중기를 설치할 필요가 있다고 판단되는 현장에는 설치할 수 있다.

11) 계약상대자는 기초공법(지정공사 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

가. 공사 착공 후 지반조사 분석/보고서의 오류로 설계변경(예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중을 검토 후 관련 법령(계약상대자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지반조사, 분석하여야 한다.

12) 장애인 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영하여 장애인들의 접근성을 충분히   배려하도록 계획한다. (외부 보행로, 주차시설, 내부 이용시설 등)

가. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 공사비와 예산

- 설계자는 용역수행 시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 발주청과 협의하여 적정 예산의 수립 및 관리에 노력하여야 한다.

- 개산견적과 별도로 상세견적은 계약문서에 의한다. 이때 계약상대자는 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가 발생 비용, 기존 시설의 일시 이동비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

- 특히 신·재생에너지(지열, 태양에너지 등) 환경 친화형 설계에 따른 추가공사 비용에 대한 적정성 검토는 과업 초기 단계부터 소요 예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하여 발주청의 승인을 득한 후 후속 공정을 진행해야 한다.

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 및 중소기업제품 공공구매제도 운영요령에 따라 공사용자재 직접구매 대상 품목에 대해서 국가계약법에 따른 품목별 각종 구매제도(3자단가, 다수공급자계약, 총액계약, 신기술인증, 우수제품인증 등)에 맞도록 적정성을 검토하여 설계 내역서를 작성하여야 한다.

13) 설계의 책임 및 손해배상

가. 계약상대자의 책임범위

- 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 등에 의한 손해배상 책임을 지며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정ㆍ보완요구가 있을 때는 계약상대자 부담으로 시정ㆍ조치하여야 한다.

- 수급인은 계약서에서 정한 기간 내에 성과품을 완료하여야 하며, 이를 위반시 기술용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의 사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등)하여야한다.

다. 발주처의 사정에 의하여 공사 발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응해야 한다.

14) 기타 사항

가. 관계기관 인허가·심의 등 행정절차 및 인증계획을 수립하여 제출하여야 한다.

나. 토목계획은 지하층(기계실·전기실만 계획)을 조성하는 작업으로 시설의 효용성, 구조의 안전성 및 경제성을 고려하여 계획한다.

다. 기초구조는 대지 여건, 지층 조건, 공사 목적 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 등의 제반 여건을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 적용할 수 있도록 계획한다.

제4장 설계도서 작성

1. 공통사항

1) 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2 및 본 과업을 위해 필요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

2) 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 설계도서 작성기준

1) 설계도면 분리작성

가. 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초, 장비용량계산서 등) 단, 발주 단위에 대하여는 필요시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건설폐기물(지정) 처리 도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

2) 설계도면 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

- A-○○의○ 또는 A-○/○○( ○○ : 전체PAGE, ○ : 해당PAGE를 표시함)

- 도면표기 머리문자

공 종	건축	건축 구조	인테 리어	토목	조경	기계	전기	통신	소방 기계	소방 전기
기 호	A	S	EX	C	L	M	E	ET	MF	EF

- 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량 산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

·각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

·각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명기

·각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

·각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명기

·각종 부착물 및 부품에 대한 명시

·특수공법에 대한 공인기관의 기술검토 보고서 첨부 및 설명서(상세도)의 작성

·도면이해를 위한 주기사항 및 시공시 유의사항을 명시

·부호, 방향KEY PLAN, GRAPHIC SCALE, ROOM NAME 등

·계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

·계통설명도

·수량집계표

·건축, 기계설비, 전기, 통신 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

·국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

·기타 관계 규정에 따라 요구되는 사항을 명기

2) 설계도면의 작성

가. 제도용지 원도(트레이싱 페이퍼)는 영구 보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 제5장을 참고한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표시하여야 한다.

라. 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신도면은 “감독관”의 지시에 따라 동일한 축적으로 표현하여 공종 간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며, 최종보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여 기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

바. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

- 각부 치수 및 사용 자재의 명확한 표기

- 각종 부착시설물의 표시

- 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

- 특수공법인 경우는 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

- 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우는 공인기관 기술검토서 첨부

3) 시방서 작성기준

가. 시방서는 설계도면에 표기하기 어려운 시공방법, 품질기준 등을 명기하여야 한다.

나. 시방서는 일반시방서, 특기시방서, 자재시방서로 구분하여 작성한다.

다. 시방서는 국토부제정 표준시방서 및 관련 기준에 적합하도록 작성한다.

라. 일반시방서에는 설계개요, 인허가사항, 일반 시공방법에 대하여 기술한다.

마. 특기시방서에는 일반시방서에 포함되지 않은 다음 사항을 포함 작성하여야 한다.

- 레미콘 구입 시 KS규정 상 슬럼프 허용오차를 고려하여 현장타설시 소정의 슬럼프치가 확보될 수 있도록 특별시방서에 명기할 것

- 각종 자재 및 부품의 시공방법(가공, 조립 및 설치)에 관한 사항

- 각종 구조공법과 이에 따른 부수시설 및 장비사용에 관한 사항

- 관련공사간의 시공책임 한계 명시

- 가설시설물의 설치에 관한 사항(가건물, 비계, 흙막이, 형틀 등)

- 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

바. 자재시방서에는 사용재료의 품질, 규격등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항을 명기하여야 한다.

사. 특수공법 및 특수자재로써 국내 관련 규정이 없을 때는 그 품질, 규격 및 시공 방법에 대하여 외국의 기준을 적용할 수 있으나 관련 사항을 충분히 검토 작성하여야 한다.

아. 사용자재에 있어서는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

자. 도면 및 시방서 콘크리트의 품질(강도, 슬럼프치, 설계방법, 시공순서, 콘크리트 타설순서, 균열방지 대책, 양생방법 등)에 대해 명기하여야 한다.

4) 내역서 작성기준

가. “수급인”은 용역 성과품 제출 시 건축, 기계·지열설비, 토목, 조경, 전기․태양광설비, 통신(전화, 인터폰, TV, 방송설비, 무대장치), 소방, 가구 등 각 분야별로 내역을 분리하여 작성 제출하여야 하며, 총괄서류는 “감독관”과 협의하여 제출하여야 한다.

나. 예산내역서의 작성은 일위대가표 및 정부제정 관련공사 표준품셈을 적용하여야 함.

다. 실적단가를 적용할 경우는 국토교통부 실적단가집 또는 조달청 실적단가를 기준으로 작성하며, 임의로 타 공사의 내역단가를 적용하여서는 안 된다.

- 재료비

·조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달청 가격정보)으로 한다.

·조달정보지에 미수록된 자재는 재정경제원에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 3개 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용한다.

·상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2개 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격을 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

·규격제품 중 조달청 3자단가 등록제품에 대한 관급자재(시멘트, 철근, 레미콘 등)는 조달수수료를 포함하여 도급공사 금액과 별도로 작성한다.

·「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제12조 및 같은 법 시행령 제11조에 해당하는 제품은 발주기관이 직접 구매하도록 관급자재로 반영하여야 한다.

- 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

- 경비, 일반관리비 및 이윤 등은 예정가격 작성요령과 관련법에서 정하는 법적부담금과 조달청에서 공고한 각 공사별 제비율 적용기준에 준하며, 모든 경비 등은 법적요율 이내로 적용한다.

- 본 공사는 품질시험계획 대상공사(초급품질관리대상)로 국토교통부 고시 “건설공사 품질시험기준”에 의한 품질관리비를 반드시 계상하여야 한다.

- 공사비에는 지장물 철거비, 폐기물 처리비, 지장물 이설비, 한전 인입비, 상수도 인입비, 도시가스 인입비, 시운전비(전기, 기계)등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

- 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록하여야 한다.

- 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나, 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

- 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

- 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

- 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

- 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부

- 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」규정에 따라 녹색제품을 활용하여야 한다.

3. 계획설계

1) 정의

"계획설계"라 함은 당선된 안과 삼사위원의 의견을 반영하고 기획업무 내용을 참고하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

2) 일반사항

가. 계약상대자는 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 발주기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

나. 계약상대자는 대지에 대해 측량을 하고, 주변 상황을 참고로 하여 계획설계를 진행하고 작업 진행 시에는 최소 3개 이상의 대안을 제시하여 발주기관의 확인 후 진행하여야 한다.

다. 계약상대자가 제출한 3개 이상의 대안이 부적합하다고 발주기관이 검토의견을 통보하는 경우는 조속한 시일 안에 새로운 2개 이상의 대안을 재작성하여야 한다.

라. 발주기관 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 계약상대자는 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

마. 선정된 1개의 계획(안)에 대하여 스케치업, 스터디 모형을 만들어 제시한다.

3) 계획설계(안) 작성시 포함사항

가. 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

나. 주변 도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

다. 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

라. 우․오수처리계획

마. 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

바. 조경계획

사. 개략공사비 산정내역

아. 측량성과도

자. 조감도 또는 투시도(각 대안별 1개 이상)

차. 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(기존 유사 건물 조사 분석 자료 등)

4) 현장조사방법

현장조사는 관련 문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가. 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나. 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원 사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변 건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원 요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

다. 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

5) 측량조사방법

가. 일반사항

- 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

- 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독관과 협의 후 현지측량에 임해야 한다.

- 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

- 본 지침서에 명기되지 않았으나 계약상대자가 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

- 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

- 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 발주기관에서 부담한다.

- 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 계약상대자가 책임지며, 계약상대자 부담으로 이를 해결하여야 한다.

- 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 계약상대자는 이를 계약상대자 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

- 지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

- 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10% 이상 여유있게 측량해야 한다.

나. 조사측량

- 경계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 기준으로 지적공사에 측량을 의뢰하여 성과도를 제출하여야 한다.

- 현황측량(평판측량)은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

- 축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 과업면적의 10% 이상 여유로 측량하여야 한다.

- 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 감독관과 협의 후 결정한다.

- 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

- 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

- 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

·각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

·각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

·현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시하여야 한다.

·주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

- 각종조사 및 계산

·지적의 복제 : 기 조사된 지적도와 현황측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

·계산 : 각종 계산은 감독관이 제시한 소정양식에 의하여 실시한다.

다. 표시항목

측량성과도에는 측량성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변 도로 도시계획도로선, 주변 건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

4. 중간설계

1) 정의

중간설계는 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관 분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

2) 일반사항

가. 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

나. 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

다. 주요 기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

라. 기계, 전기설비, 통신 및 주요 장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

마. Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 확인을 받는다.

3) 지반조사

가. 일반사항

- 지반조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치 등)를 제출하여 발주기관의 확인 후에 조사를 실시하여야 한다.

- 현장시추작업 시 반드시 현장에 설계용역 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장시추일정을 발주기관에 보고하여 발주기관에서 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만, 발주기관 사정에 의해 입회하지 못할 경우는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전 과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주기관에 보고하여야 한다.

- 지반(지질)조사는 엔지니어링기술진흥법에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링 활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행하여야 한다.

- 지반조사는 발주기관이 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관 상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 발주기관의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는 현장 여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

- 계약상대자는 현장 지반조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주기관의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

- 지반조사 시 책임기술자를 상주하여 지반조사 시험규정 등 관련 법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

나. 지반조사 방법

- 지반조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지반조사를 실시함을 원칙으로 한다.

- 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지반상태의 변화가 심하고 공사기간 중 장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 발주기관의 확인 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

- 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층(연암 2.0m이상)까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 실시하여야 한다.

- 계약상대자는 현장 지반조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시하여야 한다.

- 계약상대자는 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

- 계약상대자는 과업지시서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 관련규정 및 발주기관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

- 지하질의 분포상태, 연약층의 유․무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공한다.

- 시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 검토 및 지정하여 실시토록 하고 토층여건과 토층변화에 따라 (변화가 심할 때 등) 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

- 토질조사 보오링 시추 및 표준관입 시험을 원근에 따라 1개소당 2매 이상 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 작성 제출하여야 한다.

- 본 조사설계의 토층, 심도, 원위치 시험, 실내시험 등은 추정한 것인바, 조사결과에 따라 설계에 맞추어 정산한다. 단 증가된 사항은 인정하지 않는다.

- 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

·조사명, 조사기간, 조사위치, 조사자, 시행자, 시추번호, 시추장비명, 각 채취시료의 위치 및 심도, 시추중에 나타난 층의 관찰

·지하수위 : 시추 완료후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

·코아회수율 및 천공속도, 앞층 천공압력 및 비트 회전속도

·기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

·시추중에 판단하는 토층 및 암층분류

·토층 및 암층의 심볼위치

- 수급자는 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합분석하여 공사비 산출 및 기초구조가 경제적이고 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성하여야 한다.

- 수급자는 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

·조사명, 조사시행자명, 요약 보고문(수급자 대표 및 기술자의 인명날인), 조사개요, 조사세부내용 및 기타(지층분포상태 및 지층의 특성, 지하수위 분포, 표준관입시험 결과, 기초형태에 대한 제안, 기초지반의 지지력), 제시험의 성과표, 시추주상도, 조사현황 사진

- 지반조사 보고서는 별도로 제출한다.

다. 지반조사시험

- 자연시료채취

연약 점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내 시험용 불교란 자연시료를 채취하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

- 지하수위측정

·시추공내의 지하수위는 시추완료 후 일정시간(24, 48, 72시간)이 경과한 후 각각 측정하여 조사 지점의 안정된 수위를 산정한다.

·지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.

- 표준관입시험

·표준관입시험은 KS 규정에 의거 시험방법에 따라 실시한다.

·시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1.5m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10㎝ 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격회수를 기록한다.

- 하향식 탄성파 탐사

·시추공 주위 암반의 심도에 따른 P파와 S파의 속도측정

·측정한 P파와 S파 속도로부터 포아슨비 및 동탄성계수, 동전단계수 산출

·지반의 동적특성(동전단탄성계수, 동탄성계수 등)을 파악하여 내진설계시 활용

·내진기준에 관련한 설계지반등급 산정

- 시험의 종류 : 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석, 일축압축 등

- 토질시험

·표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약 점토층의 자연시료에 대한 시험은 KSF 규정에 의거하여 실시한다.

- 암석시험

- 채취된 암석코어 시료에 대한 시험은 공인규정에 의거하여 실시한다.

- 기타시험

·토질 및 암석시험은 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다.

- 시료상자 정리

·시료상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자 내에서 토사나 암석코아를 채취심도 별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며, 암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

·암석코아가 아닌 슬라임만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관한다.

- 사진촬영

· 조사 전․후 및 현장시험 광경 중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전 과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형 흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독관이 지시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

라. 기타 유의 사항

- 계약상대자는 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야 한다.

- 보링주상도에 사용하는 심볼(symbol) 등 각종 표시 및 기호는 표준기호를 사용한다.

- 계약상대자는 현장조사 및 실내시험이 완료되면 성과를 종합 분석한 보고서를 제시하여야 한다.

- 계약상대자는 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록하여야 하며 책임기술자가 인명 날인하여야 한다.

· 조사명, 조사 시행자명, 조사개요, 조사 세부내용, 조사 성과분석, 제 시험 성과표, 시추 주상도, 토층 단면도, 조사 위치 평면도, 조사 현황 사진, 보링 코아 사진, 지질도, 위치도, 기타 필요 자료

4) 설계서 구성

가. 건축

- 설계보고서

·공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

·설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

·현지조사사항 : 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사. 분석. 검토 내용(반영사항 표기)

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도,  도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

·개략공사비 산정(일위대가표 불필요)

※ 공종별 개략내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

·주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

- 구조계획서

·설계근거기준

·구조재료의 성질 및 특성

·제반하중조건에 대한 분석

·각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

·구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

·지진에 대한 고려사항 등

- 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

- 도면종류

·부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

·배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

·주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

·대지구적도

·건축면적 산출 표

·내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

·각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

·입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

·단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

·계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

·각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

·주요 구조부 단면상세도

·기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

나. 토목

- 설계보고서

·공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

·계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

·시공방법

·개략공사비 산정

·기타 필요한 사항

- 구조 및 수리계산서

·구조계산서

·수리계산서

- 지반조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지반조사 방법에 따른 성과물

- 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

- 도면종류

·위치도

·종단면도 및 횡단면도

·평면도

·구조물도 및 부대시설도

·유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

다. 조경

- 설계보고서

·공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

·개략공사비 산정

·기타 필요한 사항

- 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

- 도면종류

·위치도

·조경계획 평면도 : 축척, 식재 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

라. 기계설비(소방 포함)

- 설계 설명서 : 개략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

- 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

- 설계계산서 : 간이부하 계산서, 에너지절약 계획서, 주요장비의 개략계산서(유사 건물 비교)

- 도면종류

·범례 및 도면목록

·기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

·배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치, 기기 반출입구 위치 등

·계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 자동제어, 기타설비의 계통도

·평면도 : 각종 설비 샤프트의 크기, 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 기준층 평면도

·단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

·옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

·기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마. 전기

- 설계 설명서

·전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

·수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

·에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

·인입방식 및 인입지점에 대한 설명

- 계산서

·부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

- 시방서

·자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.

단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 도면종류

·현장 안내도

·범례 : 사용될 기호

·배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

·옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

·수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

·각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

·각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

·기타 실시설계의 기준이 되는 도면

바. 정보통신

- 설계 설명서

·통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

·통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

·에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

·국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

- 계산서

·통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

·통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

·케이블 트레이 용량계산서 등

- 시방서

·자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.

단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 도면종류

·현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

·범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

·배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

·옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

·통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

·각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 기타 통신설비의 계통도

·각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

·기타 중간설계의 기준이 되는 도면

사. 소방설비

- 설계 설명서

·소방설비개요 : 각 설비(자동화재감지설비, 옥외·옥내소화전 등)에 대한 설명

·소방설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 자동화재감지설비, 옥외·옥내소화전 설비의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 계산서

·자동화재감지설비(감지기, 피난유도등) 산출서, 소화용수 산출서

·케이블 트레이 용량계산서 등

- 시방서

·자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.

단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 도면종류

·현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

·범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

·배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

·옥외간선도 : 소방설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 소화용수 인입지점 및 경로

·소방장비 배치도 : 각종 기기의 배치계획도

·각종 설비의 계통도 : 자동화재감지설비, 소화설비 등의 계통도

·각종 설비의 배치도 : 수신반, 중계기, 발신기 등의 배치도

·기타 중간설계의 기준이 되는 도면

5. 실시설계

1) 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행 방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영 여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

2) 일반사항

가. 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

나. 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

다. 설계도서 작성 기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

라. 전기, 기계설비, 통신 및 주요 장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

마. 납품 전에 발주기관이 검토용 설계도서 제출 요구 시 이에 응하여야 한다. (검토용 도서 제출 일자 발주기관과 협의)

3) 설계서 구성

가. 건축

- 설계설명서

·공사개요 : 위치, 대지면적, 공사 기간, 설계금액 등

·설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주 용도 등

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

·세부시공방법

·공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

·건물의 색채사용계획

·공정계획(공정표 포함)

·기타 필요한 사항

- 구조계획서

·설계근거기준

·구조재료의 성질 및 특성

·제반 하중조건에 대한 분석

·각부 구조계획

·구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

·지진에 대한 고려사항 등

·구조계산서

- 시방서

·당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

·특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

- 도면종류

·부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

·조감도(투시도) : 천연색채 사용

·도면 목록표

·배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

·부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

·주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

·구적도

·건축면적 산출표

·내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

·각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

·각층 천정평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

·지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

·주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

·주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각 실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

·계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

·각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

·각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

·부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·조경계획 평면도 : 축척, 식재평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

·조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

·건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

·기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 1/50정도)를 작성하여야 한다.

- 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

나. 토목

- 설계보고서

·공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

·계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

·사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

·세부시공계획 및 자재사용계획

·세부공정계획

·세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

- 구조 및 수리계산서

- 지반조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

- 시방서

- 도면 종류

·위치도

·종단면도 및 횡단면도

·평면도, 구조물도, 부대시설도, 우·오수처리도

·기타 시공에 필요한 사항 일체

- 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

다. 조경

- 설계보고서

·공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

·사전조사사항

·세부조경계획: 사면보호, 식재계획 등

·자재사용계획

·세부공정계획

·세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

- 시방서

- 도면 종류

·배치도

·종단면도 및 횡단면도

·평면도

·조경시설물 배치도

·기타 시공에 필요한 사항 일체

- 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

라. 기계설비(소방 포함)

- 설계설명서

·냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기 투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 에너지절약계획서, 간단한 운전요령서 등

- 시방서 : 당해 공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

- 도면종류

·건축 주요 부분 평면도, 단면도, 방화구획도

·범례

·도면 목록표, 계통도

·기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

·배치도 : 옥외평면(상하수도, 가스의 연결 관계, 기계실의 위치, 기기 반출입구 위치, 정화조, 공동구 등 전체배치도), 기계실 장비배치도

·계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

·평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도

·단면도 : 각종 설비의 주요 단면도, 기계실 단면도, 시공에 필요한 사항 일체

·옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

·상세도 : 각종 설비 및 주방기구 상세도

·기타 필요한 도면

- 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

마. 전기

- 설계설명서

·전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

·수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

·에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

- 계산서

·각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

·조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

·전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

·수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

- 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

·자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.

단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

·특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 도면종류

·도면 목록표, 현장 안내도

·범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

·배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

·옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

·옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

·수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

·각종 설비의 계통도, 배치도, 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

·평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·기타 필요한 도면

- 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

바. 정보통신

- 설계설명서

·통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

·통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

·에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

·국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

- 계산서

·통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

·통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

·케이블 트레이 용량계산서 등

- 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

·자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.

단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

·특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 도면종류

·현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

·범례 : 사용될 기호

·배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

·옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

·통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

·각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

·각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

·각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

·각종 설비의 배치도, 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·평면도, 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·기타 실시설계의 기준이 되는 도면

- 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

사. 소방설비

- 설계 설명서

·소방설비개요 : 각 설비(수신기, 중계기, 발신기, 소화전 등)에 대한 설명

·소방설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명

·본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

·소화용수 인입지점 및 배치에 대한 설명

- 계산서

·자동화재감지장비의 감지기, 유도등에 대한 산출서

·비상발송설비 설치 면적

·케이블 트레이 용량계산서 등

- 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방 한권으로 구성)

·자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다.

단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

·특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 도면종류

·현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

·범례 : 사용될 기호

·배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

·옥외간선도 : 소방설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 소화용수 인입지점 및 경로

·소방설비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

·각종 설비의 계통도 : 자동화재탐지설비·소화설비 및 기타설비의 계통도

·각종 설비의 배치도 : 비상방송실, EPS(TPS)실, 화재수신반, 중계기, 발신기 등 소방설비 및 기타 필요 설비의 배치도

·각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

·각종 설비의 배치도, 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

·각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

·평면도, 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

·기타 실시설계의 기준이 되는 도면

- 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

아. 설계도서 작성 시 유의사항

- 도면, 시방서(표준시방서 및 전문시방서) 및 내역서 즉, 설계도서 상호간 자재, 규격, 공법 등이 필히 일치할 것

- 내역서의 품명 또는 규격란에 재료명, 시공방법 등을 명확히 표기

- 각 공종에 대한 모든 품목은 일위대가표 작성이 원칙

- 내역서 작성 시 전문업체 견적가격을 적용한 품목은 해당 견적서 첨부(복수견적)

- 내역서는 반드시「조달청 공사원가호환규정 및 표준공사코드」를 준수한 전산파일(확장자:XML)로 작성하여 제출할 것

- 사후 정산공종(P.S.)이 있을 경우에는 특기시방서에 품명, 범위, 수량, 해당금액 및 정산 방법 등을 표기하고 현장설명시 배포하는 현장설명서에도 표기

- 관급자재는 도급자 설치 관급액과  관급자 설치 관급액으로 구분 표기(산업안전보건관리비 산정 시 도급자 설치 관급액만 반영)

- 폐기물은 품명, 규격란에 폐기물 종류(내장재, 구조물 철거재, 혼합폐기물 등) 및 처리방법(매립 또는 재활용처리)을 표기하고, 중량합계가 100톤 이상일 경우에는 별도 발주 내역 작성

- 공사비분석표를 작성할 것

제5장 성과품의 작성 및 납품

1. 성과품 작성

1) 일반사항

계약상대자는 설계용역 성과품을 용역공정예정표의 제출일 이전에 발주기관의 승인을 득한 후 인쇄한다.

가. 모든 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

나. 도면상의 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글 사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

다. 최종 납품 도서내용은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(국토교통부고시 제2020-635호)」 [별표 2] “건축설계에서의 도서작성”를 따른다.

2) 종합보고서

가. 설계용역의 계약내용, 추진과정, 참여기술자 현황, 하도급 현황, 설계설명서, 설계도서의 수정보완 현황, 건물유지관리계획서, 납품 설계도서 목록 등 전체적인 설계과정을 기술하는 보고서로서 다음의 내용을 포함한다.

- 표지

- 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

- 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

- 목차

- 위치도

- 과업의 목적

- 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

- 조사 및 분석(현지답사, 수리·수문조사, 측량, 지장물조사, 지반조사 및 토질시험, 교통량 및 교통시설 조사, 토취장, 골재원, 사토장 조사, 용지조사, 관련계획 자료조사, 환경영향조사, 소음·진동조사, 구조물조사, 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 결과조사, 기타조사)

- 설계기준

- 관련계획 검토사항

- 계획설계 내용

- 중간설계 내용

- 실시설계 내용

- 시공 및 유지관리 시설계획(공사예정공정표, 시공순서, 시공방법, 공사중 교통처리, 지장물 이설, 유지관리시설)

※ 공사예정공정표

- 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비, 초기투자비와 유지비의 비교표)

- 부록(각종 조사자료, 설계심의 및 자문회의 결과 및 지적사항 조치와 설계반영 내용, 주요 설계도면 협의 및 지시사항, 주요자재 및 공법 선정·비교

- 설계실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 『개인정보 보호법』에 따라 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

- 기타 발주기관 요구사항.

3) 구조계산서

가. 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 한다. 특히, 프로그램의 입ㆍ출력 자료는 모든 Case별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

나. 계산에 사용된 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리하여 수록한다.

다. 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다. 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주기관과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

라. 구조계산서의 각 페이지 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어 계산의 적정여부를 확인 후 서명토록 한다.

마. 구조계산 시 주요 설계계수가 가정 값인 경우 반드시 가정 값임을 표시한다.

4) 설계도면

가. 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

나. 설계도면은 한글(필요 시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

다. 도면 하단의 표제난의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

라. 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 담당건축사가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

마. 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요 설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

바. 설계도면에는 관련 도면난을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면명을 표기한다.

사. 모든 도면은 CAD program을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB에 담아 제출한다.

(CAD파일 및 PDF파일)

5) 유지관리지침

가. 개    요 : 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

나. 구조계획도 : 구조일반도, 주요단면도

다. 구조특성 : 구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징

라. 유지관리시설 : 시설의 종류, 목적, 사용방법

마. 점    검 : 주요 점검항목, 점검방법

바. 보수방법 : 건축마감, 기계설비, 전기설비 등

6) 공사시방서

가. 공사시방서는 공사 계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

나. 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

- 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

- 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

- 관계법령에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

- 계약상대자(시공자)가 작성하여야 할 시공상세도 목록

- 계약상대자(시공자)가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

- 발주기관과 계약상대자(시공자) 사이의 책임범위 및 한계

- 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

- 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

- 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

- 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

- 기타 주요공사 사항

다. 공사시방서 작성 시 유의사항

- 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

- 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

- 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

- 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

- 공종전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

- 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

- 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

- 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약상대자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

- 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

- 시공상세도 작성지침에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 한다.

라. 공사시방서 작성 시 국토교통부 제정 표준시방서 및 전문시방서를 기준으로 작성하여야 한다.

7) 설계예산서

설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서로 구별하되 단가산출서는 별책으로 작성한다.

가. 설계예산서에는 총공사비와 공사개요를 기재한다.

나. 총괄내역서에는 제경비 산출근거가 포함되어야 한다.

다. 설계예산서는 설계용역 완료 30일 전 해당 월을 기준으로 작성하여야 한다.

라. 노임기준은 당해연도 공사노임단가(대한건설협회)를 기준 한다.

마. 재료비는 정부구매물자 가격정보(조달청)를 포함하여 3개 이상의 물가정보지를 참조하여 산출한다.

바. 품셈은 당해 연도 건설공사 표준품셈에 준한다.

사. 중기손료 작성 시의 외환환율은 해당년도 1월 3일자 기준 외환은행 전신환매도율을 기준으로 한다.

아. 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 상의하여 2개 업체의 견적서를 기준으로 적용할 수 있다.

자. 설계예산서는 회계예규 예정가격 작성기준에 따라 작성한다.

차. 설계내역서 수록사항

- 설계서의 표지

- 설계설명서(공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

- 공사예정공정표 : 우기·동절기 등 공사 중지기간 및 공사로 인한 민원예상 등을 충분히 고려하고 시공전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

- 설계내역총괄(설계예산, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서, 일위대가 등)

- 설계내역서(도급비, 사급비, 이전비, 기타)

- 일위대가표(단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견표 등)

카. 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준으로 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며 수량산출서는 별책으로 작성한다.

- 각 공종별로 수량을 산출·집계하여야 한다.

- 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

- 각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

타. 시공상세도 작성비용은 대가기준에 따라 산정하여 포함하여야 한다.

파. 「산업안전보건법」 제30조에 따라 계상되는 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 「건설기술 진흥법」 제63조 등에 따른 안전관리비용(시설물의 안전관리를 위한 비용)을 계상하여야 한다.

하. 공사손해 보험료 산정

- 공사 손해보험료를 계상하기 위한 보험료율은 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 자료를 충분히 조사하여 적정한 요율을 산정하여 설계에 반영한다.

8) 용지도ㆍ지장물조서 및 인ㆍ허가도서

가. 보상대상 및 지장물조서 작성

- 과업용지 내 보상대상 및 지장물은 종류별로 상세하게 조사 기입한다.

- 보상대상 및 지장물은 발주기관과 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

- 과업시행으로 인하여 훼손되는 지장수목의 현황을 조사하여 기재한다.

나. 인ㆍ허가 도서 작성

- 관계법령에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인·허가 요청용 도서를 작성한다.

9) 공사 예정공정표 작성

예정공정표는 NETWORK 기법으로 설계원도 및 청사진에 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축소하여 제출한다.

10) 설계도서 검토

가. 검토방법

- 설계시행 책임기술자가 검토

- 각종 계산서 확인 검토

11) 기 타

가. 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

나. 도면의 크기는 KS A 5201의 A0∼A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

다. 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 윈칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

2. 성과품 납품

1) 성과품의 납품은 계획설계 납품, 중간설계 납품, 실시설계 납품, 실시설계 최종납품으로  구분한다.

2) 계약상대자는 필요에 따라 실시하는 자문 및 협의에 필요한 도면 및 서류를 최소 10일전까지 제출하여야 하며, 최종 성과품은 과업수행 종료일에 납품하여야 한다.

3. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계도서	A3(반접)	3	부	개략적 조감도, 추정공사비내역서 포함
2	현장조사보고서	A4	3	부	유사시설견학보고서 포함
3	지반조사보고서	A4	3	부
4	관련법규 검토서	A4	3	부

※ 위 설계도서 전부를 USB로 제작하여 별도 제출

※ 단, 발주기관과 협의하여 납품도서의 종류, 규격, 수량을 조정할 수 있다.

4. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략 공사비
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전문시방
6	조감도(초안)		1	부								협의·결정

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 설계도서 전부를 USB로 제작하여 별도 제출

※ 단, 발주기관과 협의하여 납품도서의 종류, 규격, 수량을 조정할 수 있다.

5. 실시설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규 격	수 량	단 위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	4	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계도면	A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접
		A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접
3	구조계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	공사내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	ems 파일제출
5	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	단가산출근거	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적단가 적용시 비교견적서 포함
8	일위대가	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	표준시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	전문시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	조감도		1	부	◯							액자형 표구 포함 (0.6m*0.9m이상)
13	예정공정표		4		◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공정 포함
14	USB (전체성과품포함)		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	설계도면dwg PPt파일 포함
15	기타 발주기관 요구사항		1	식	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

※ 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정·보완 지시사항 및 조치결과, 납품설계도서 목록 등을 기재하여 A4규격의 책자로 양면 인쇄하고 좌철(접착제)하여야 한다.

※ 공사 예정공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 NETWORK 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성 제출하여야 한다.(국토부고시 제2021-1080호를 근거호 하여 작성)

※ 설계도면, 계산서, 내역서, 시방서 등은 공종별로 별도 제본하여 납품하여야 하며, 폐기물은 관계법령에 따라 분리발주 대상일 경우 별도 제본하여 납품한다.

※ 공종분야별 구분 등에 대하여는 발주기관과 협의하여 제출한다.

※ 납품 수량은 발주기관과 협의 조정할 수 있으며, 발주자 필요 시 추가납품을 요구할 수 있다.

※ 각 분야별(건축·토목·조경·기계, 전기, 통신, 소방공사)로 통합본(공사원가계산서·설계내역서·일위대가·단가대비표·수량산출서, 설계도면)은 각 1부씩 별도로 제출한다.

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

□ 용  역  명 :                        설계용역

□ 계약  일자 : 20  .   .   .

□ 착수  일자 : 20  .   .   .

□ 완수예정일 : 20  .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제36조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 발주기관에 귀속됨을 알고 별도로 발주기관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20  년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : <참여공종 표기>

성        명 :                   (인)

전북대학교총장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                         설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

전북대학교총장 귀하

〔붙임 3〕 하도급 승인 요청서

하도급 승인 요청서

1. 용  역  명 :                      설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

전북대학교총장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하계약 상대자	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조 (엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2 (건설기술자의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술관리법 제6조의 2(건설기술자의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업기본법 시행규칙 제27조의 2
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약특수조건 제6조

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                       설계용역

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

전북대학교총장 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(20 . . .)	금주예정사항(20 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

전북대학교총장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

전북대학교 총장 귀하

〔붙임 7〕

건축 설계도서 내역 반영확인서

〇 사 업 명 :

〇 사업개요

- 위    치 :

- 대지면적 :

- 규    모 :  지하  층  /  지상  층  /    동

- 연 면 적 :

- 사업내용 :

- 총사업비 :

〇 설계용역 개요

- 설 계 자 :

- 설계기간 :

- 계약금액 :

위 공사의 설계도서 내용이 내역서에 적정하게 반영되었음을 확인하였으며, 현장 불일치와 내역서 미반영 등으로 설계변경 요인이 발생 할 경우 어떠한 행정조치도 감수하겠습니다.

20  년     월     일

설 계 자                 직인

전북대학교 총장 귀하

〔붙임 8〕 설계용역 공정표[설계관리 일정표]

* 상기 일정표는 例이며, 본 사업의 설계용역기간을 감안하여 최종 설계용역계약자가 새로이 작성․정리하여야 한다.