과   업   지   시   서

지리산국립공원 장터목대피소 정비사업

- 목     차 -

Ⅰ. 일반사항	1

1. 과업 개요	1

2. 과업의 범위	2

Ⅱ. 과업의 내용	4

1. 일반사항	4

2. 설계진행 시 제출서류	5

3. 보고회 및 회의	6

4. 관계기술자 협력	8

5. 조사사항	8

6. 설계변경 및 계약취소	10

7. 기타 준수사항	11

Ⅲ. 설계 지침	17

1. 기본방향	17

2. 분야별 설계지침	18

3. 설계도서의 분리작성	28

4. 설계도서 표기	29

5. 설계도면 작성	29

6. 기타 유의사항	30

Ⅳ. 설계도서 납품목록	31

1. 일반사항	31

2. 기본설계 납품도서	31

3. 실시설계 납품도서	32

Ⅴ. 각종 서식	33

Ⅰ

일반사항

1. 과업 개요

가. 과업명: 지리산국립공원 장터목대피소 정비사업

나. 과업 목적

1) 고지대 탐방객 안전확보 및 공원자원관리를 위한 탐방 기반시설 개선을 통해 고지대 탐방서비스 제고

2) 대피소의 제기능을 원활히 수행하고 안전하고 쾌적한 이용환경 제공을 위한 장터목대피소 정비

다. 사업 개요

1) 사업위치: 경남 함양군 마천면 강청리 산 100일원(장터목대피소, 화장실)
경남 산청군 시천면 중산리 산 208일원(취사장)

2) 부지면적: 현황측량도 참고(2,000㎡ 이하)

3) 건축규모: 연면적 660㎡미만 (-5% 범위 내 조정 가능)
건폐율 20%이하, 높이 9m 이하

※ 건축규모는 설계과정 중 발주자와 수급자가 협의하여 조정 할 수 있으며, 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가용역비는 지급하지 않는다.

4) 구조: 산악지형에 시공가능한 적합한 구조 반영

5) 설계용역비: 251,500,000원(VAT 포함)

6) 추정공사비: 5,250,000,000원(VAT 포함)

7) 설계용역범위

- 정비계획 수립 및 사업개요에 관한 검토(부지 내 건물배치 비교검토 포함)

- 중간 및 실시설계, 내진설계, 기존 건축물 철거공사 설계 등

- 공원사업시행계획 결정고시에 필요한 자료 작성

- 제반 행정절차에 필요한 자료 작성/제출(설계심의, 인·허가 등)

- 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 폐기물처리 등 제반 분야의 기본 및 실시설계용역 수행

- 각종 인허가 및 인증(제로에너지건축물 인증, 장애물 없는 생활환경 인증(해당시) 등) 포함

- 건축물 설계와 별도로 각종 시설분담금 등도 산출하여 반영

8) 사업내용

- 대피소(주) 및 화장실(부) 신축 / 취사장(부) 리모델링
※ 차량접근 불가, 상하수 인입 불가

9) 설계기간: 착수일로부터 120일(공휴일 포함)

※ 각종 인증, 행정절차 등에 따라 변동될 수 있음

2. 과업의 범위

가. 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경, 폐기물처리 등의 기본․실시설계도서, 공사시방서, 각종 심의․인증 자료 작성 등

1) 에너지절약계획서, 건축인허가 관련 서류, 건축구조안전 및 내진설계 기준 반영, 기타법령에 의한 서류 등 작성과 제로에너지건축물 인증(1등급 이상), 장애물 없는 생활환경 인증(해당 시), 신재생에너지 적용 등 탄소저감 방안
(※수수료 발주자 부담)

2) 용역착수 후 현장 답사는 물론 발주자․감독관과 함께 유사시설을 답사(답사보고서 제출)하고, 인․허가 관청 방문․협의, 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가를 취득하기 위한 선결조건을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 수급자는 본 용역이 완료된 후라도 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하거나 공사 시행 중 설계변경이 필요한 경우 수급자 부담으로 책임지고 적극 협조하여야 한다.

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문․심의, 평가 등 업무 협조 지원

다. 공사 발주 관련 공종별 현장설명서 및 공사예정공정표 작성

라. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주자(감독관)가 필요하다고 인정하여 지시하는 사항에 대한 보고서 작성

마. 설계는 현황측량(계약 후 자료 인계예정) 성과도를 기준으로 진행

바. 기본설계 완료 후, 실시설계 완료 전 설계 적정성 검토를 위한 자료 작성

사. 기타 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주자와 수급자의 협의 하에 수행한다.

Ⅱ

과업의 내용

1. 일반사항

가. 수급자는 본 과업을 수행함에 있어 발주자와 수시로 협의하고 협의된 사항을 설계에 최대한 반영하여야 한다.

나. 수급자는 국내외 타지역의 유사시설을 현장 견학하여 외관, 기능, 주요 마감자재, 유지관리, 문제점 등을 충분히 조사․분석한 후 신축 취지에 맞게 설계에 반영하여야 한다.

다. 용역수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 수급자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

라. 본 사업은 국립공원 내에서 시행하는 사업임을 감안, 관련 법규의 준수는 물론 자연자원보호를 준수하여야 한다.

마. 설계 중 기시행 설계도를 참고할 수 있으나 현지 여건에 따라 관련 법규 등 적용하여야 할 관계 규정을 준수토록 한다.

바. 본 공사에 따른 해당 기관의 인·허가 구비 서류는 과업수행자가 작성하고 해당기관에서 보완 요구 시에도 이를 작성하여야 한다.

사. 주요공법 및 특수품 적용 시 사전에 발주기관과 협의하여야 한다.

아. 설계 시 현지여건에 따른 미관성, 편리성, 견고성 및 관리의 용이성에 유념하고 바닥마감재 선정 시 사용자 안전성 고려

자. 과업수행자는 본 과업을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없으며 일부 과업의 하도급 필요시 발주기관과 사전 협의하고 그 내용을 발주기관에게 통보하여야 한다.

2. 설계진행 시 제출서류

가. 수급자는 용역착수 시에 다음 서류를 착수일에 제출한다.

1) 착수계 1부

2) 책임기술자 선임계 1부 [서식 2]

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

※ 관계법규에 의한 심의기간 및 과업지시서 내용 중 소요되는 관련기관 협의일정과 착수보고회 및 중간보고일정 등을 포함

8) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함) [서식 1]

9) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급자는 착수계 제출 후 15일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 용역의 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

다. 수급자는 착수계 제출 후 30일 이내에 유사시설 견학을 완료하고 설계공모안에 적용할 개선사항을 반영하여 발주처와 협의한다.

라. 과업착수 후 60일 이내에 다음 서류를 제출하여야 한다.

1) 기본설계보고서(건축계획서, 기본설계도면, 조감도, 개략공사비 산출서 등)

2) 관련법규 검토서

3) 현장조사 결과보고서

4) 제로에너지건축물 인증 관련 자료 및 설계반영

5) 장애물 없는 생활환경 인증 관련 자료 및 설계반영(해당 시)

6) 신재생에너지 적용 관련 자료 및 설계반영

7) 유사시설 견학보고서(현장 답사보고서 포함)

8) 지반조사보고서(조사야장, 토질조사 자료 등 일체) ※발주처 별도 시행

9) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

마. 설계기간 만료일 전까지 다음 서류를 제출하여야 한다.

1) 실시설계 검사원 [서식 4]

2) 실시설계도서 일체/내부 실별 인테리어 도면(가구배치 포함)

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 완료보고서

6) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

7) 건축인허가(협의)중 에너지관리공단 협의서(해당 시)

8) 제로에너지건축물 예비인증서

9) 장애물 없는 생활환경 예비인증서(해당 시)

10) 공원계획 및 공원사업시행계획 결정고시 등 협조 자료

11) 기타 발주자의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

바. 기타 서류

1) 용역의 진도보고서

- 주간공정보고 [서식 5], 월간공정보고 [서식 6]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 서류

3) 설계안전보건대장

4) 설계안전성검토 보고서(해당 시)

5) 해당 사업 완료 시 건축물대장 등 관련 서류 일체

3. 보고회 및 회의

가. 착수보고

1) 업무 착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 15일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

2) 업무 착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

나. 중간보고, 완료보고

1) 기본설계의 경우 용역착수 후 기본설계가 확정될 때까지 1회 이상

2) 실시설계의 경우 용역중간 및 설계도서 제출 전까지 2회

3) 대표자 또는 분야별 책임자가 PPT 등을 이용하여 보고할 수 있다.

다. 수시보고

1) 주간공정보고, 월간공정보고를 제출하여야 한다.

2) 설계용역 진행 시 발생하는 문제점을 분석하여 해결책을 수시로 보고한다.

라. 업무회의

1) 수급자는 설계진행과 관련하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

2) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

3) 본 과업지시서는 기본적인 사항에 관한 것으로 수급자는 대안을 제시하고 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

4) 수급자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석하도록 하여야 한다.

5) 수급자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주자의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

마. 기타회의

1) 발주자의 필요에 따라 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 과업수행자는 발주자의 요청이 있는 경우 수급자 부담으로 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다. 또한 지적된 사항과 요구사항은 종합하여 변경 및 보완이 필요한 경우 설계에 반영하여야 한다.

2) 설계진행 시 문제점이 발생하거나, 기본설계 및 실시설계 보고에 필요한 자료를 작성․배부하고 회의를 개최한다.

4. 관계기술자 협력

가. 수급자는 본 과업과 관련 발주자의 요구가 있을 시 전문기관(국립공원공단, 대학, 연구소 등)에 기술검토를 의뢰하여야 하며, 이에 따른 소요경비는 발주자가 부담한다.

나. 건축법 시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력), 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)와 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시) 11. 관계전문 기술자의 협력을 참조하여 기술자의 협력을 받아야 한다.

다. 필요시 국립공원공단 건축자문위원을 활용하여 창의적이고 국민과 소통하는 공간이 될 수 있도록 설계하여야 한다.

5. 조사사항

가. 자료조사 및 제출

1) 수급자는 기본․실시설계 등을 진행함에 있어 자연적 물리적 여건 등 예측 가능한 모든 사항을 조사하고 충분한 자료를 수집하여 설계의 질을 높여야 하며, 안전하고 경제적이며 최신시설이 되도록 노력해야 한다. 또한 조사과정에서 조사수행원의 안전에 각별히 유의하여야 한다.

- 지적도, 대지경계 등 관계 공부, 지반조사 등 자연조건, 유사시설 및 설비현황 등

2) 수급자는 설계 전 반드시 현장 확인하고 각종 인입위치 선정 등에 있어 확인 결과를 설계에 반영하여야 한다.

나. 각종 조사사항

1) 현지답사

- 수급자는 현지 답사하여 탐방객 수 및 이용형태 등을 조사하여 설계에 고려하여야 한다.

- 수급자는 지형․지질 등의 자연 상황, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사부지, 작업장 등의 확보 가능 여부를 판단하여야 한다.

- 현지답사 및 조사 시에는 반드시 기존건물 등 시설물의 균열 등에 대하여 사진 또는 비디오를 찍어 사진첩에 정리하여 1부는 발주자에게 제출하며, 민원발생 및 구조물 계획 시 참고하도록 한다.

2) 지장물 조사

- 계획구간 내 각종 지하매설물과 지상시설물을 현장 및 자료를 정확히 조사하여 설계에 반영한다.

- 지장물 중 이설이 필요한 시설(각종 배관ㆍ케이블 등)은 해당기관과 협의하여 설비를 산출하고 사업비에 반영하여야 한다.

- 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 하여야 한다.

- 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어야 한다.

3) 배수조사

- 우수, 한수, 유수지시설, 구조물 표면수 및 지하배수와 같은 제반사항에 대한 위치 표고 등 각종 사항을 조사하여 구조물 설계에 필요한 자료로 활용할 수 있도록 한다. 특히 하절기 집중호우에 대비한 배수계획을 충분히 검토 반영하여야 한다.

4) 소음, 진동조사 (환경영향조사)

- 계획대지 주변에서의 소음을 측정 조사한다.

- 사업시행으로 인한 환경영향 예측 및 저감대책을 수립하여 공사 진행 중 환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서에 포함하도록 공사시방서에 반영한다.

5) 구조물 조사

- 계획대지 부근의 기존 건물을 비롯한 각종 구조물 현황 등을 조사한다.

6) 관련계획 자료조사

- 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 후 반영한다.

- 계획 대지 관련 토지이용계획 등 관련 사업계획을 조사검토하여 설계에 반영한다.

- 국내 타 유사시설 등을 현장 견학하여 외관, 기능, 주요마감자재, 유지관리 등에 대한 착안점 및 보완점 등을 충분히 조사․분석하여 설계에 반영하도록 하고, 또한 본 사업의 취지에 맞게 설계하여야 한다.

7) 기타 조사사항

- 본 건축물 조성에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원문제 등을 조사 검토하여 설계에 반영한다.

6. 설계변경 및 계약취소

가. 수급자는 다음의 경우 발주자와 협의하여 설계변경 할 수 있다.

1) 계획 변경으로 인해 과업범위가 변경된 때

2) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

3) 천재지변, 사업추진 취소 등 불가항력사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

4) 관계기관의 협의 또는 발주자의 계획이 변경된 때

나. 다음 사항에 해당하는 경우 계약을 취소한다.

1) 과업의 이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 정당한 사유 없이 과업지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 기타 계약조건을 위반할 때

다. 수급자는 다음 사항에 대해서는 발주자의 사전승인을 득한 후 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 기본계획을 포함한 주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 관계기관과의 협의사항

4) 기타 발주자의 지시나 수급자의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

7. 기타 준수사항

가. 작업반 구성

1) 수급자는 본 과업을 수행함에 있어 전문 분야별(건축, 구조, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등) 기술자로 구성된 작업반을 편성하여 본 과업을 수행하되, 전기분야의 설계는 전력기술관리법 등 관련 법령에 따라, 소방 분야는 소방시설공사업법, 통신전자정보처리 부분은 정보통신공사업법에 따라 유자격자에 의해 업무를 수행하여야 하며, 건축분야 수급자의 총괄 관리하에 업무를 추진하고 구성원의 이력서, 조직표 등을 과업수행계획서 제출 시 발주자에게 제출하여야 한다.

2) 1)항 외 건축구조, 기계설비, 토목, 조경 등 전문분야는 등록된 국가기술자격법에 의한 해당분야 기술사 자격 소지자로 하여금 수행하도록 하되, 건축분야 수급자가 총괄하여야 한다.

3) 수급자는 본 과업의 최종설계 보고서상에 참여기술자의 명단과 실제로 참여한 업무내용을 구체적으로 명기하여 제출하여야 한다.

나. 관급자재의 선정

1) 근거 규정

- ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙｣

- ｢중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령｣ 제11조

- ｢조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준｣(조달청 훈령)

- 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률

2) 수급자는 위 규정에 따라 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성하여 제출하여야 한다.

3) 수급자는 관급자재 선정심의에 필요한 자료작성 시 감독관과 긴밀히 협조하여 관급자재 선정심의 운영에 적극 협조하여야 한다.
※ 발주처 관급자재 구매 심의위원회 기준 적용

다. 하도급의 범위

1) 수급자는 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 수급자는 발주자가 인정하는 업무에 대해 부분적으로 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 하도급 승인요청 시 명단을 포함하여 제출하여야 하며, 수급자는 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

3) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

- 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

- 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

- 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

- 건설공사의 수량 및 견적업무

- 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

라. 에너지절약 건축물 설계

1) 관련 규정

- 녹색건축물 조성 지원법

- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시)

- 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시)

- 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법

2) ‘건축물의 에너지절약설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 에너지절약 사전협의 실시

- 에너지절약형 설계, 고효율에너지 기자재 사용

- 제출서류

·건축협의 시 제출하는 에너지절약계획서에 준용하는 도면과 근거서류

·공공기관 신축건물 에너지 관련 사업협의 신청서

·고효율에너지기자재 적용 Check List

·관련자료, 기타 증빙서류

3) 제로에너지건축물 인증에 관한 신청서 근거 서류 등 작성․제출

4)‘신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법’에 따른 공급의무비율 적용 설계

5) 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 신청서 근거 서류 등 작성․제출(해당 시)

마. 보안사항

1) 수급자는 본 과업내용에 따라 작성 또는 제출되는 각종 보고서, 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2) 수급자는 과업수행에 있어 아래와 같이 보안의무를 진다.

- 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며, 폐기물은 소각이 불가능한 경우를 제외하고는 소각처리를 원칙으로 한다.

- 보안의무 불이행으로 인하여 발주자에게 불이익이 발생한 경우에 이와 관련한 모든 책임은 수급자가 진다.

바. 정산 및 책임

1) 발주자는 수급자에게 사전 통보하고 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며 수급자는 이에 따라야 한다.

2) 과업수행 중지 또는 과업내용의 증감이 발생할 경우는 당해 계약금액을 조정 또는 정산한다. 단, 과업범위의 현저한 변경이 없이 기본 및 실시설계 결과, 과업지시 기준 공사비를 초과한 부분에 대하여는 용역비를 증액 지급하지 않는다.

3) 설계용역비가 과다 계상된 경우 발주자는 설계 납품완료 이후라도 수급자에게 변상을 요구할 수 있고 수급자는 즉시 이를 이행하여야 하며 이와 관련하여 민․형사상 소를 제기할 수 없다.

4) 용역설계에 의한 공사시공 중 아래와 같은 설계도서상의 하자로 인한 피해발생 시 수급자는 손해배상 등 그에 대한 책임을 져야 한다.

- 누락, 오류, 과다 계상 등 설계내역서가 부적절한 경우

- 수급자 및 하도급업자의 사전조사 및 자료 분석 미비 등으로 인하여 기술상 중대한 결함이 발생하여 이에 따라 경제적 손실 및 공사 진행에 지장을 초래했을 경우 등

5) 납품된 설계도서는 발주자의 승인을 득한 후 저작권 일체를 발주자의 소유로 하며 설계용역 완료(건축협의, 승인포함) 후 설계비를 정산하며 증액된 부분은 인정하지 아니하며 감액된 부분은 정산한다.

사. 관계사항 숙지의무

1) 수급자는 본 과업지시서 내용을 포함하여 본 용역 시행과 관련한 전반사항을 숙지하고 업무를 수행하여야 하며, 이를 숙지하지 않아서 발생되는 제반 문제에 대하여 책임을 진다.

2) 수급자는 발주자의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급자의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대해 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역완료 후에도 이러한 사항에 대한 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급자의 부담으로 시정․조치하여야 한다.

3) 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 건설공사 조사 및 시험규정, 한국산업규격 등 관련 규정에 따라 발주자와 협의하여 결정하며, 이견이 있을 경우 감독자의 의견에 따른다.

4) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주자가 필요하다고 인정하는 중요사항은 최대한 발주자의 지시에 따라 과업을 수행하여야 한다.

5) 수급자는 과업 수행 중 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 그 손실을 보상하여야 하며 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대해 책임을 진다.

6) 발주자가 수급자의 대리인이나 고용인이 과업 수행에 부적당하다고 인정할 때는 과업 수행 중이라도 즉시 교체를 명할 수 있으며, 수급자는 즉시 이를 따라야 한다.

7) 설계도서의 작성은 국토교통부 고시 설계도서 작성기준에 의하여 작성하여야 하며 설계도면에는 수급자, 검수자, 확인자 등 서명날인 하여야 한다.

8) 수급자는 건축협의 등 각종 행정절차 승인, 협의, 인허가를 완료할 수 있도록 제반조치를 취하여야 하며, 납품 후라도 행정절차 이행이 완료되어야 본 용역이 완료된 것으로 본다.

9) 건축평면도 작성지연으로 인한 기계설비, 전기, 소방, 통신 등 설계용역기간 축소로 과업에 영향을 끼치지 않도록 하여야 하며, 이로 인한 책임은 수급자에게 있다.

아. 기타

1) 수급자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주자의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 다른 주요내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주자의 제출요구가 있을 경우 이에 따라야 한다.

2) 수급자는 관계 법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리(스마트안전장비 도입 등)에 최선을 다하여야 하며 수급자의 과실이나 부주의로 인해 발생하는 사고 및 손해에 대해 책임을 져야 한다.

Ⅲ

설계지침

1. 기본방향

가. 사업부지는 자연환경보전지역 및 백두대간보호지역으로 공사로 인한 백두대간 능선 등 자연환경 훼손이 최소화되도록 하며 주변 훼손지의 복원계획을 수립하여야 한다.

나. 사업부지는 산악지대로 차량 진입, 상하수도 인입 등이 불가하므로 현장상황(자재운반 등)을 고려하여 계획한다.

다. 사업대상지는 수많은 탐방객이 통과하는 곳으로 공사기간 동안 대피소의 기능(숙박 제외, 화장실, 매점, 취사장 등)을 유지할 수 있도록 계획하고, 공사 시 주변환경에 피해(소음, 분진 등)가 최소화되도록 환경관리 방안을 계획한다.

라. 독립형 개인 침상 제공, 탐방객 셀프체크인, 무인판매기 도입(대피소, 취사장 각 1대) 등 탐방객 이용행태를 분석하여 계획하여야 한다.

마. 무방류순환수세식 화장실, 고온 플라즈마 음식물쓰레기 처리기 도입 등 대피소 여건에 적합한 공법, 신기술 도입을 계획하여야 한다.

바. 고지대 풍하중, 적설하중 등 특수성을 고려한 자재 선정하고, 구조적 안전성 강화 및 재난상황 대비 효율적인 피난 동선을 확보하여야 한다.

사. 재생에너지 도입, 단열성능 강화, 고효율 자재 사용 등울 통한 친환경 에너지ㆍ절약형 대피소를 계획하여야 한다.

아. 대피소의 특성, 타시설과의 관계, 부대시설 등을 종합 분석하여 배치하고 국립공원 건축물의 특색이 반영된 내외부 디자인이 될 수 있도록 계획한다.

자. 관리자 측면에서 원활한 업무처리가 가능하고 시설관리가 용이하며 건축물의 생애주기비용이 최소화될 수 있도록 계획한다.

차. 대피소 상전 인입에 따라 불필요한 공간의 재활용 계획을 수립하여야 한다.

카. 기타 과업지시서에 명시되지 않은 시설이라도 당연히 필요하다고 판단되는 시설은 설계에 반영하여야 한다.

2. 분야별 설계지침

가. 건축계획

1) 계획주안점

가) 기존의 대피소와 화장실은 철거 후 신축하고 기존 취사장은 리모델링하는 것으로 계획하며, 본동과 별동이 조화를 이루도록 계획한다.

나) 공사기간 동안 대피소의 기능(화장실, 매점, 취사장)을 유지할 수 있도록 고려하여 계획한다.

다) 우리나라 최초의 국립공원으로 지정된 지리산 내에 있는 8개 대피소를 연계한 거점기능을 수행할 수 있도록 이용 및 유지관리에 편리하도록 배치계획을 한다.

라) 장터목대피소의 상징성 부각 및 인지도가 제고되도록 하여야 하며, 자연 친화적인 건축물로서 형태, 색채, 마감자재 등 건축물 외관이 주변 환경과 조화를 이루도록 계획한다.

마) 고산지 특수성을 고려하여 자재운반 시 항공운반 등을 고려한 자재 및 공법을 계획한다.

바) 사업부지의 현황을 인지하여 안전하고 쾌적한 외부동선을 계획한다.

사) 사업대지는 산악지이므로 지형 및 단차 등을 면밀히 조사 분석하여 절토 및 성토를 최소화할 수 있는 활용방안을 검토하여 대지의 경사를 적극적으로 이용한 합리적인 동선체계 및 단면계획을 한다.

아) 모든 시설(휴게공간, 대피공간, 관리공간 등)은 기능이 상호 유기적으로 연계될 수 있도록 공간배치 및 동선계획을 한다.

자) 시대 변화에 따른 요구와 기능의 변화에 대한 융통성 있는 공간으로 계획한다.

차) 공간계획은 시설의 특성을 고려하여 내부 공간구성에 있어 불필요한 공간을 최대한 억제하고 동선을 최소화하여 공간 활용이 효율적이고 경제적인 설계가 되도록 계획한다.

카) 각종 시설은 중앙 집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영, 관리가 가능한 경제적인 설계가 되도록 한다.

타) 계단실과 각층의 전기, 기계설비, 냉난방 배관 등은 최대한 집중하고 단거리로 설계하는 등 경제적이고 효율적인 수직□수평계획이 되도록 한다.

파) 친환경․에너지 절약형 대피소를 지향하여 주변 환경과 조화를 이루면서 건물에너지 효율을 높인 환경 및 자연친화적인 건축계획으로 저탄소 녹색성장을 구현하여야 하며, 제로에너지건축물 인증을 취득할 수 있도록 계획하여야 한다.

하) 신재생에너지(태양광에너지 등) 도입을 통한 에너지자립률을 제고한다.

거) 패시브 건축 적용으로 에너지의 효율성을 강화한다.

너) 불연재·준불연재 자재 사용을 통한 화재 안전성 확보한다.

더) 본 과업과 관련된 건축, 토목, 기계설비, 소방, 전기, 통신, 조경 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 유지에 적합하고 상호 연관성을 보장하여야 한다.

2) 분야별 계획

A. 건축 분야

가) 일반사항

- 설계안 제출 시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

- 관련법에 적합하고 필요한 행정적. 법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 한다.

- 토지 이용률 및 시설 이용의 효율성을 극대화할 수 있도록 계획한다.

- 안전한 보행환경과 진입마당, 조경 및 편의시설 등 외부공간의 종류와 개략적인 규모를 도면에 명시하여 외부공간 활용방안을 구체적으로 제시한다.

- 효율적인 공간 활용 동선계획을 극대화하기 위해 기능별 세부 시설면적을 일부 조정할 수 있다.

- 색상은 주변 환경과 조화되고 상징성이 나타날 수 있도록 색채계획을 수립한다.

- 모든 구조물의 계획 및 단면결정은 장래 계획까지 수용할 수 있도록 결정한다.

- 건축물의 구조계획 및 시공계획, 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 경제적인 설계가 되도록 한다.

- 유지관리를 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화되는 일이 없도록 설계한다.

- 반드시 사업비 범위 내에서 설계가 되어야 한다.

나) 공간계획

- 주변의 자연환경과 조화를 이루면서 주 진입로에서 건물의 시인성과 접근성을 고려한 건축물의 배치계획으로 탐방객들에게 인지도를 높일 수 있도록 계획한다.

- 층수 및 층별 면적은 제한이 없으며 공원사업의 시행기준에 따라 건축물의 높이는 9m 이하, 건폐율은 20% 이하로 합리적으로 계획한다.

- 전체 건축물을 주1동(대피소-신축), 부1동(화장실-신축), 부2동(취사장-기존 존치)으로 구분하며 탐방객 동선(대피소 이용객 및 통과 탐방객)과 관리자 동선이 접근하기 쉽고 효율적인 동선계획이 될 수 있도록 검토하여야 한다.

- 화장실은 탐방객들이 공사기간 중에도 사용할 수 있어야 하며(화장실 신축 후 기존 화장실 철거 등), 대피소 이용객 및 통과 탐방객 이용수요, 고산지 여건을 고려하여 설비량, 용량 등을 계획해야 한다.

- 공원관리 역량강화 및 직원복지 향상을 위한 근무여건 개선에 중점을 두고 관리공간을 계획하며 직원복지에 대한 인식 변화로 직원숙소 확충(총 5개소) 및 개별화장실을 설치한다.

- 숙직실은 휴게 및 취침 기능을 포함하여 사무실 내에 배치한다.

- 홀은 대피소 이용객 및 통과 탐방객이 휴식하고 대피하는 공간으로 탐방정보(산행, 일출시간 등) 및 고지대 문화체험시설 등을 검토하여 계획한다.

- 각종 창고는 용도 및 성격에 따라 기능을 고려하여 적절하게 배치한다.

- 대피실은 조망권을 최대한 확보하도록 하고 탐방객의 프라이버시 확보(캡슐형 도입) 등 질 높은 이용시설을 제공할 수 있도록 계획한다.

- 내부공간은 크게 탐방객 공간과 관리자 공간으로 영역을 구분하여 상호 상충되지 않도록 계획한다.

- 사무공간은 상주시간이 긴만큼 채광과 전망이 양호하고, 소음 또는 진동이 발생할 수 있는 탐방객이 이용하는 공간과 구분하여 배치한다.

- 복도 등 공용공간은 시각적 폐쇄감을 주는 공간 및 동선 위주 공간을 지양하고 각 부분공간으로 이어지는 연결공간을 휴식과 소통을 위한 휴게공간으로 활용하는 방안을 고려한다.

- 기계실, 전기실은 주로 항온항습설비, 건물 유지를 위한 공간이므로 장비반입을 위한 출입구를 고려하고 효율적인 건축물 유지관리가 될 수 있도록 계획한다.

- 탐방객 동선 중 일반인 접근금지 시설(기계실, 전기실, 창고 등)은 일반인이 바로 출입하는 것을 사전에 방지할 수 있도록 설계한다.

- 본 지침에 명시되어 있지 않더라도 관련 법령에 따라 설치가 반드시 필요하거나 유사시설 조사결과 설치가 필요한 경우 지침 연면적 내에서 설계에 반영한다.

3) 시설별 면적 및 계획

구 분	세부시설	면적(㎡)	비율(%)	비 고
대피공간	대피실1	108	16.4	2.5㎡/1인(폭 1.2m), 2단 또는 3단 침상 가능 - 120명 수용가능한 구조
	대피실2	114	17.3
	남자탈의실	4	0.6
	여자탈의실	4	0.6
	소계	230	34.9
관리공간	사무실(관리실) 및 매점	39	5.9	매점과 통합 설치 운영 가능(숙직실 포함) ※ 판매물품은 국립공원예약시스템 홈페이지 참고
	화장실	3	0.5
	스낵창고	9	1.4	매점물품 보관용 ※ 판매물품은 국립공원예약시스템 홈페이지 참고
	영선·방재창고	7	1.1	공구 등 보관용
	직원숙소1~5	60	9.1
	직원식당	24	3.6	식당(주방) 8.4㎡
	다용도실	6	0.9
	물탱크실	6	0.9
	부식창고	6	0.9	직원식당용
	전기ㆍ기계실 등	20	3.0
	소계	181	27.3
공용공간	방풍실 및 신발장	14	2.1
	홀	53	8.0
	복도 및 계단실	70	10.6	외부계단 바닥면적 포함
	화장실(남/여)	43	6.5	무방류 순환수세식 화장실 별동으로 조성
	취사장	69	10.5	기존 취사장 리모델링
	소계	249	37.8
합 계		659	100

※ 전체 연면적은 660㎡ - 5%의 범위 이내로 계획하여야 한다. 다만, 실 구성, 층수 및 면적은 각 시설의 기능과 예산을 고려하여 설계자가 합리적, 창의적으로 조정 가능. (필요한 추가시설 제안 가능)

※ 국립공원 건축물 가이드라인 참고하여 계획할 것

□ 독립형 침상 도입 사례

(침상의 사례를 참고하여 대피소 면적기준을 참고하여 최적의 안을 도출하여 제시가능)

4) 입면계획

- 국립공원의 상징성을 가지면서 외부에서 국립공원의 인지도가 제고될 수 있도록 하여, 주위와 조화롭고 주변 경관을 개선할 수 있도록 계획하여야 한다.

- 용도 및 기능별 독창성을 부여하되 전체가 동질성을 갖는 입면을 고려하여야 하며, 법적 제한 내에서 조망권, 가시권 등을 최대한 확보하여야 한다.

- 건물의 외장재는 자연채광을 비롯하여 미관, 단열, 소음방지 및 부식에 대한 내식성 등을 고려하여야 하고 풍압과 지진 등의 외력에 대응할 수 있도록 하여야 한다.

- 채광 및 환기를 고려하여 개폐율이 높은 창호를 설치하여야 하며, 단열 등을 통하여 에너지절약 및 쾌적한 환경 조성이 가능하도록 계획하여야 한다.

6) 단면계획

- 공간 특성에 맞는 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립적이면서 기능상 상호 유기적 관계가 되도록 수직 동선을 고려한다.

- 건축물의 최고높이는 9m 이하가 되도록 하며 기능과 실면적에 따라 적정한 높이가 가능하도록 계획한다.

7) 구조계획

- 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 특수구조이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우에는 이를 객관적으로 인정할 수 있어야 한다.

- 내진과 내풍에 대한 안정성 확보와 중력하중 및 횡하중에 대하여 충분한 내력을 갖추며, 각종 변형에 충분히 대처할 수 있도록 하여야 한다.

B. 디자인 분야

가) 배치 및 형태

- 건축물은 지형과 경관의 맥락에 순응하여 배치하고, 탐방로와 조망 축에서 위압적이지 않도록 계획한다.

- 외관은 단순하고 절제된 비례를 지향하며, 불필요하게 과시적이거나 인위적인 디자인은 지양한다.

- 지붕의 형태는 자연경관과 조화를 이루도록 주변 지형 및 경관의 맥락을 고려하여 설계한다. 다만, 적설 및 풍 환경에 영향을 받는 경우에는 경사지붕을 원칙으로 계획한다.

- 건축물 높이는 주변 조망권을 해치지 않도록 제한하고, 주요 기능 간 동선의 효율성을 확보한다.

- 기존 건축물은 안전성·기능성·환경적 영향을 종합적으로 고려하여 철거를 원칙으로 하되, 역사적·미관적 가치가 있는 경우에는 건물의 일부를 보존·활용하는 방향을 검토한다. 이 경우 보존되는 부분은 신축 건축물과 조화롭게 어울리도록 설계하여야 한다.

나) 재료

- 목재·석재 등 자연재료를 우선적으로 활용하여 국립공원의 자연성과 지역성을 드러낸다.

- 현대적 재료(금속·유리·합성재 등) 사용 시에는 비반사·저광택 마감 및 자연색 도장 처리로 경관 위화감을 최소화한다.

- 모든 재료는 내구성 및 유지관리 용이성을 확보해야 하며, 적설·습기·강풍 등 기후적 특성을 고려한다.

- 재활용 가능 재료, 국산 친환경 인증 자재를 적극 반영하여 저탄소·친환경 건축을 지향한다.

다) 색채

- 건축물의 색채는 주변 산림·토양·암석과 유사한 중채도·저명도의 자연색을 적용한다.

- 주조색(Main Color)은 외관의 약 70% 이상을 갈색·회색·토색 계열로 적용하고(단, 주변 산림·토양·암석을 고려), 보조색(Sub Color)은 창호·난간·지붕 등 일부 요소에 20~30% 범위 내에서 사용하여 주조색과 유사한 톤으로 변화를 준다.(예: 어두운 청회색, 짙은 갈색) 또한, 강조색(Accent Color)을 적용하는 경우에 사인·가구류 등 제한된 시설에 5% 이내로만 적용한다.(원색·고채도 색상 금지)

- 내부는 목재 질감을 드러내는 저채도 색상으로 계획하고, 안정감을 주는 따뜻한 톤을 권장한다.

라) 미관 및 경관 조화

- 건축물은 국립공원의 상징성과 정체성을 드러내되, 탐방 경험을 방해하지 않는 절제된 미관을 유지한다.

- 외형은 주변 자연경관 속에서 위압적이지 않게 설계하고, 경관 훼손을 최소화한다.

- 외부 부속시설(난간, 표지판, 취사장, 화장실 등)은 국립공원공단 시설별 매뉴얼에 따른 일관된 디자인 체계를 유지한다.

- 야간조명은 빛 공해를 최소화하며, 불가피할 경우 은은한 간접조명만 허용한다.

C. 토목 및 조경계획

가) 토목계획

- 굴착에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 각종 규제조치를 초과하지 않도록 굴착형식을 선정하여야 한다.

- 절성토량 최소화 등 주변환경에 영향이 없도록 계획한다.

- 포장은 친환경성, 안전성, 시공성, 경제성, 유지관리, 사용자의 편의성 등을 고려하여 적정 포장재를 선정하도록 하며, 포장단면은 동결지수, 토질조건 등을 고려하여 계획한다.

- 공사부지 현황에 대한 기본조사, 지반조사(제공자료활용)를 기본설계 시 수행하되, 이에 수반되는 모든 비용은 설계용역비에 포함되어 있다.

나) 조경계획

- 부지의 여유공간에는 주변 환경과 어울리는 녹지계획을 수립하며, 적절한 휴식공간 및 녹지공간을 계획하여야 한다.

- 수목생육을 감안하여 적정한 토심을 확보하고 수목의 특성을 고려하여 배식하여야한다.

- 지리산국립공원 내 자생하고 있어야 하며 외래종은 배제한다.

D. 기계설비·전기설비·정보통신계획

가) 기계설비계획

- 대상 부지 주변의 열공급․하수처리․급수 등의 기반시설을 파악하고 이를 적극 활용할 수 있도록 하여야 한다.

- 건물 규모, 유지관리 효율성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 급수, 급탕, 배수, 통기 등의 위생설비 계획을 세우고 적합한 시스템을 계획하여야 한다.

- 급수 및 소방설비는 단수 및 정전될 경우를 고려하여 즉각적인 대처가 가능하도록 하여야 한다.

- 소방설비는 인명의 안전과 경제성을 고려하여 대응이 용이하도록 하여야 한다.

- 장비특성을 고려한 조닝으로 고장 발생 시 전체적인 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

나) 전기설비계획

- 전기실은 유지관리를 고려하여 충분한 공간을 확보하고 침수로 인한 피해가 발생하지 않도록 유의하되, 특히 펌프실 등 물을 사용하는 장소와는 완전하게 구획하여야 한다.

- PS는 전기용(EPS)과 정보통신용(TPS)을 별도로 계획한다.

- 수전설비

·특고압 수전설비는 정식 수전설비로 설계하여야 하고, 수전전압, 부하용량, 특성, 간선손실, 전압강하 등을 고려하여 절연방식과 변전방식을 선택한다.

·수전용량은 각 실의 면적, 기기, 동력, 부하의 특성, 수용률, 향후 부하증가 등 운전 조건을 충분히 고려하여야 한다.

- 조명설비는 주변부와 어울리게 합리적으로 계획하여야 한다.

- 전기설계는 관련된 건축, 기계, 통신 등 모든 분야에 상호 적합한 호환성을 가지며 관련 부하에 전원이 공급될 수 있도록 하여야 한다.

다) 정보통신계획

- 정보통신설비는 각 실내에서 사무자동화 시스템을 검토하고 시설관리시스템(FMS)은 전력자동제어, 조명자동제어 등 향후 정보통신설비의 증설 및 신개발 시스템 도입 시 각 실의 구조변경 없이 자유롭게 설치 가능하도록 계획하여야 한다.

E. 기타계획

가) 보안설비계획

- 통합보안설비는 출입통제, CCTV, A/V(전관방송)등을 수용하여 계획한다.

나) 신재생에너지계획

- 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」에 근거하여 신․재생에너지(지열, 태양광, 연료전지)등의 설치계획을 세우고, LCC를 고려한 가장 유리한 시스템을 결정한다.

- 에너지 절약 관련법규 등을 적극 수용하여 환경친화적 건축물로 계획하여야 한다.

- 냉․열원 공급시스템은 심야전력 시스템, 가스 시스템, 열병합발전 시스템, 지열이용시스템 등을 면밀히 검토하여 가장 경제적이고 합리적인 방식으로 계획하여야 한다.

다) 공사비 원가절감을 고려한 계획

- VE(가치공학) 개념을 도입하여 과다한 구조물의 발생을 사전에 억제하고 공사예산이 절약되며, 기능의 최적화를 고려한 설계안을 작성한다.

- 유관시설을 집중화하고 동선을 최소화하여 원자재의 사용량을 절감할 수 있어야 한다.

- 난방 효율 등을 고려하여 유지관리에 따른 비용을 절감할 수 있어야 한다.

- 모듈 설정 시 자재 모듈을 고려한 계획으로 노임 및 자재 낭비를 최소화하여야 한다.

3. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방, 조경 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역(도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출 기초 등)을 작성하여야 한다.

나. 발주 단위에 대하여는 필요시 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

4. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 한국어로 함을 원칙으로 하고 부득이한 경우 한국어와 외국어를 병행하여 사용 할 수 있다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1∼2회 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

5. 설계도면 작성

가. 도면규격은 「Ⅴ. 설계도서 납품목록」을 참고한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

다. 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 완료보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

6. 기타 유의사항

가. 수급자는 기본계획 설계 완료 이전에 득하여야 할 각종 심의 및 협의를 득하고 관련 법규를 충분히 검토하여 관련 규정에 저촉되어 시행 불가능한 내용이 되어서는 아니 되며 기반조사 등 각종 조사를 실시하여 그 결과를 설계에 반영하여 기본설계 성과품을 납품하여야 한다.

나. 전체 내부에 인테리어 설계 및 가구배치 등을 발주자와 협의하여 별도 인테리어 설계가 될 수 있도록 한다.

다. 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

라. 부지 경계부근의 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

마. 본 사업과 관련하여 특별히 고려하고 주의해야 할 사항, 발주자의 요구사항에 대해서는 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 하며 조사내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독관 요구에 따라 보완․수정, 전면 재검토하며, 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급자가 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면으로 제출하여 감독관 승인을 득한 후 추진한다.

바. 현장전경, 레벨 등 주요사항에 대해 촬영․기록하여야 하며, 조사 중 하자발생 시 수급자 부담으로 보완하여야 한다.

Ⅳ

설계도서 납품목록

1. 일반사항

가. 수급자는 본 과업지시서 및 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」등 관련법령 및 규정에 준하여 성과품을 작성 제출하여야 한다.

나. 모든 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

다. 최종성과품 작성 시 분리발주 대상은 분리발주가 가능하도록 도서를 작성하여 성과품의 납품일정에 따라 제출하여야 한다.

2. 기본설계 납품도서

가. 아래 표 기본설계 납품도서 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출한다.

나. 기본설계보고서, 설계도면, 내역서는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

다. 지반조사보고서는 A4규격으로 제본한다.

라. 조감도는 별도로 A4 규격 2매와 원본파일을 USB로 제출한다.

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	기본설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	건축계획서 등
2	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	인테리어 계획 포함
3	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략공사비
4	지반조사보고서	A4	3	부								별도용역
5	조감도(기본)	A4	2	부	◯							(0.6m*0.9m이상)
6	기타 발주기관 요구사항

3. 실시설계 납품도서

가. 아래 표 실시설계 납품도서 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출한다.

※ 기본설계 최종납품도서, 각종심의자료, 인허가 관련 문서, 회의록, 각종 발표자료 포함

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	완료보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	인테리어도면포함
4	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	관급내역서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가표	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	일반시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	특기시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	관급시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
14	인허가관련자료		3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
15	각종인증서 및 예비인증서		3	식	◯			◯	◯			제로에너지건축물 인증 등
16	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등
17	조감도,투시도	조감도(A1), 실내투시도(주요실, A3) 5점 (이미지 파일 및 출력물)										액자포함
18	기타 발주기관 요구사항

Ⅴ

각종 서식

[서식 1]

보  안  각  서

1. 용  역  명 : 지리산국립공원 장터목대피소 정비사업

2. 계약  일자 : 20  .   .   .

3. 착수  일자 : 20  .   .   .

4. 완수예정일 : 20  .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제9절 제2장(기술지식의 이용과 비밀엄수 의무)에 따라 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 따라 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 따라 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20  년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

국립공원공단 동부지역본부장 귀하

[서식 2]

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 지리산국립공원 장터목대피소 정비사업

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

국립공원공단 동부지역본부장 귀하

[서식 3]

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 : 지리산국립공원 장터목대피소 정비사업

2. 계약  금액 :               원

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게     분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 따라 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

국립공원공단 동부지역본부장 귀하

[서식 3-1]

하도급신청 자체 검토서

용 역 명	지리산국립공원 장터목대피소 정비사업
하도급 분야
하도급 계약일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급자	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건
책임기술자 기술자격 및 경력증명서
참여기술자 기술자격 및 경력증명서
하도급 금액 및 비율
하도급 사유

[서식 4]

실시설계 검사원

1. 용 역 명 : 지리산국립공원 장터목대피소 정비사업

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완료예정일 : 20  .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

실시설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

국립공원공단 동부지역본부장 귀하

[서식 5]

주 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 : 지리산국립공원 장터목대피소 정비사업

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월   일  ~  20  년  월  일

◦계약금액 :             원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항( . .)	금주예정사항( . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

국립공원공단 동부지역본부장 귀하

[서식 6]

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 : 지리산국립공원 장터목대피소 정비사업

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ~ 20  년  월  일

◦계약금액 :                원

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 ( . . ~ . .)	비 고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익 월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

국립공원공단 동부지역본부장 귀하