- 철도박물관 시설개선사업 -

건축설계 과업지시서

2025. 12.

홍보문화실

(문화홍보처)

목  차

Ⅰ. 총 칙
1. 과업의 명칭		1
2. 과업의 목적		1
3. 과업의 개요		1
4. 과업의 방향		2
라 5. 과업의 내용		2
6. 설계용역 일반사항		2
Ⅱ. 일반지침
1. 적용기준		5
2. 발주기관과 수급인의 책임 및 의무		5
Ⅲ. 설계지침
1. 설계 기본방향		9
2. 건축 세부 설계지침		11
3. 배치계획		14
4. 건축계획		15
5. 건축디자인 계획		18
6. 토목계획		29
7. 기계설비 계획		32
8. 방재설비 계획		34
9. 9. 건축구조 계획		35
10. 조경계획		36
11. 관련법규 적용기준		38
Ⅳ. 성과품 작성 및 납품
1. 일반사항		40
2. 성과품의 작성		40

Ⅰ. 총 칙

1. 과업의 명칭

철도박물관 시설개선사업 설계공모

2. 과업의 목적

- 現 철도박물관의 노후화(1988년 개관, 38년) 개선

- 다양한 철도유물의 관리보전과 협소한 공간을 130년 철도 역사와 미래의 철도문화 핵심공간으로 철도유물의 재배치 및 전시공간 확장 등 전시 운영환경을 조성

- 미래의 철도를 이끌어 갈 코레일을 대표하는 문화공간을 제공

3. 과업의 개요

가. 대지위치 : 경기도 의왕시 철도박물관로 142 일대

나. 건물규모 : 지하 1층, 지상 3층 이내 / 16,450㎡(연면적)

다. 용    도 : 문화시설

라. 예정공사비 : 금49,204백만원(부가가치세 포함)

마. 예정설계비 : 금 3,217백만원(부가가치세 포함)

바. 과업기간

1) 본 용역 기간은 착수일로부터 15개월간(공휴일 포함)이며 과업의 종료는 설계용역 완성검사에 대한 보완 완료까지로 한다.

※ 인·허가, 심의 등이 필요한 경우 해당 승인 기간은 용역 기간 산정에서 제외되나, 설계 수행기간과 중첩되는 기간은 포함됨.

※ 계약의 준공 시점은 최종 설계도서 납품, 인·허가 획득, 심의 통과 등 공사발주를 위한 모든 제반 사항이 정상적으로 종료된 시점으로 함.

2) 단, 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 각종 인·허가업무 관련 자료의 제출 및 공사 시행 중 공사상 필요한 도면수정이나 설계변경 등으로 인한 자료 제출 지시에 지체 없이 응하여야 하며, 설계 미비 및 하자에 대하여는 그 내용이 완료될 때까지 수행한다.

3) 다음의 경우에 한하여 발주기관의 승인을 얻은 후 과업 수행 기간을 변경할 수 있다.

가) 발주기관의 방침에 의하여 과업 수행이 중단될 경우

나) 발주기관의 사업계획 변경으로 과업 내용이 변경되었을 경우

다) 천재지변으로 인하여 용역 수행이 불가능한 경우

라) 기타 발주기관이 인정하는 정당한 사유로 인하여 변경이 필요한 경우

4) 과업의 지시외 추가적으로 발생하는 별도의 인증 대가는 수수료는 발주처와 협의하여 내역에 반영한다.

사. 과업의 범위

1) 본 과업은 ‘철도박물관 신축’을 위한 건축, 구조, 기계, 소방, 폐기물처리, 철거 등 전 분야의 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의(허가) 등 각종 인허가에 필요한 서류 작성‧제출, 협의 등 인허가 처리 시까지 업무 일체를 포함한다.

※ 용역성과물은 제반 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물로 제출한다.

※ 계획설계, 중간설계, 실시설계 각 단계별 설계공정계획을 수립하여야 한다.

2) 과업 성과물의 납품은 기본(중간), 실시설계 도서로 구분한다.

ㅇ 성과품의 납품 시기(기간은 발주기관과 협의하여 조정 가능)

- 계획설계 : 착수일로부터 3개월 이내

- 중간설계 : 착수일로부터 3개월 이내

- 실시설계 : 착수일로부터 6개월 이내

행정기간 : 착수일로부터 3개월 이내

3) 사업 추진과 관련한 각종 위원회 자문․심의, 영향평가 등에 대한 업무를 지원 및 협조한다. (본 설계용역이 완료된 후라도, 입찰 방법 심의 등에 따른 서류보완이 필요한 경우 발주기관의 요청에 적극 협조)

4) 필요시 장애물 없는 생활환경 인증 취득 또는 연장, 에너지 절약 계획서 검토 승인을 완료한다.

※ 각종 인증 취득 일정은 발주기관과 협의하여 완료 시기를 조정 가능하고, 인․허가 시 개정된 법규를 준수하여야 한다.

5) 기타 설계용역을 수행하는 데 발주기관이 지시하는 사항에 대해 이행 및 보고한다.

6) 공사발주와 관련하여 발주 단위 공사별 현장설명서 작성 및 적정 공사기간 등을 산출(예정공정표, 산출근거 포함)한다.

7) 발주기관의 총사업비 협의, 공사발주 준비 및 관련 자료작성 등에 성실히 협조한다.

8) 인‧허가 업무

가) 본 용역과 관련한 제반 인·허가(건물 증축 등 관계법규 및 규제에 따른 각종 인·허가 등) 일체는 수급인이 대행한다.

나) 수급인은 설계용역 착수 후 현장답사, 인·허가 관청 방문 및 협의를 통해 관련 법규 및 규제 등을 면밀히 분석하여 인·허가 추진 계획을 제출한다.

다) 도시계획변경 승인, 교통영향분석‧개선대책 등 본 과업과 관련된 각종 영향평가에 대해 수급인은 평가 대행(용역)업체와 협의하고 발주기관 업무에 적극 협조하여야 한다. (해당 시)

라) 수급인은 향후 건축허가 신청서 및 준공도서 작성, 인장 날인 등 업무에 적극 협조한다.

마) 수급인은 본 용역 완료 후에도 인‧허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요할 경우 발주기관의 요청에 적극 협조한다.

9) 기타 업무

가) 공사의 전반적인 추진 일정 등을 검토한다.

나) 과업 종료 후 사후설계관리업무에 협조하여야 한다.

※ 건축설계가 완료된 후 공사시공 과정에서 건축사의 설계 의도가 충분히 반영되도록 설계도서의 해석, 자문, 현장 여건 변화 및 업체 선정에 따른 자재와 장비의 치수·위치·재질·질감·색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토·보완 등을 위하여 수행하는 설계업무를 말하며, 건축법 제72조제8항 및 동법 시행령 제108조제3항에 따른 설계자의 업무를 포함

다) 단가산출, 일위대가, 수량산출 및 시방서, 내역서, 설계보고서 등 작성

10) 수급인은 과업지시서에 명기되지 아니한 사항에 대해서 발주기관과 협의하여 수행한다.

4. 과업의 방향

국내 유일의 철도박물관 시설개선사업이 철도문화의 발판이 되도록 설계를 지향한다.

5. 과업의 내용

· 철도박물관 건축, 구조, 기계, 소방 설비 등 전 분야의 설계도서 작성 일체

· 설계상 필요한 조사, 검사, 진단, 시험 및 현황 파악 등을 위한 업무

· 건축을 위한 법률사항 검토 등의 제반 업무수행

* 전기, 통신 26년도 분리발주

6. 설계용역 일반사항

가. 착수신고서 및 기타 제출서류

수급인은 계약 체결 후 10일 이내에 과업을 착수하여야 하고, 착수 시 다음 서류를 제출하여야 한다.

1) 착수보고서

2) 과업수행계획서

3) 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

4) 전문 분야별 참여기술자 현황(면허 및 자격증 사본, 경력증명서 첨부)

5) 용역수행 조직표

6) 예정 공정표

7) 산출내역서(분야별 용역비)

8) 보안각서

9) 기타 용역 수행에 필요한 사항

나. 업무보고 및 회의

1) 업무보고

가) 주간 보고 : 매주 1회 작성(매주 월요일 제출)

나) 월간 보고 : 매월 1회 작성(매월 말일(28일) 제출)

다) 수시 보고 : 감독관의 요청 시 수급인은 설계 진행 사항을 보고

2) 업무 회의

가) 착수 회의 : 장소와 일자를 협의하여 개최하고 관계 전문기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명한다.

나) 계획/중간/실시설계 보고회 : 설계자는 계획/중간/실시설계 발표 자료를 작성하여 최소한 보고회 7일 전까지 발주기관과 사전 협의를 거친 후 보고회를 개최하여 관련 내용을 협의한다.

다) 수시회의 : 설계 진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 발표 시 필요한 자료를 작성, 배부하여야 한다.

다. 수급인은 다음 사항에 대하여는 필요시 제반 서류를 제출하고 승인을 얻어야 한다.

1) 기성부분 검사원

2) 준공기한 신청서

3) 준공검사원

4) 하도급 통지 또는 하도급 승인요청

5) 기타 용역 수행에 필요한 사항

라. 실무자 협의 및 설계검토

1) 본 과업과 관련 수급인은 발주기관의 기계, 전기, 소방, 통신 등 관련 분야의 감독관과 수시 긴밀히 협조하여 그 지시 및 승인에 의한 설계추진에 착오가 없도록 한다.

2) 본 과업 수행 기간 중 발주기관은 다음과 같이 계획내용에 대한 타당성 검토를 관련 분야 실무자(감독관)와 협의할 계획이므로 수급인은 설계검토에 필요한 자료준비 등에 적극 협조하여야 한다.

가) 계획 검토 : 계획설계안 검토(계획설계 제출일로 5일간)

가) 중간 검토 : 중간설계안 검토(중간설계 제출일로 5일간)

나) 최종 검토 : 실시설계안 완료검토(실시설계 제출일로 10일간)

3) 검토에 대한 의견 반영 여부를 발주기관에 보고하고 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

4) 본 과업 수행 기간 중 발주기관은 상기 사항과는 별도로, 필요시 수시로 본 과업의 설계사항에 대하여 검토할 수 있으며, 이에 대한 필요 자료는 수급인이 준비하여야 한다.

마. 관련기관 인·허가 업무협의 및 관련전문가 자문

1) 수급인은 설계도서 납품 전에 관련법규에 의한 인․허가 관련부서와 충분한 협의를 하여야 하며, 협의사항에 대하여는 발주기관의 승인을 받아 본 설계에 반영하여야 한다. 단, 이와 관련된 일체의 비용은 수급인의 부담으로 한다.

2) 본 과업 수행 시 발주기관에서 전문가를 초빙하여 자문회의를 개최하는 경우 수급인은 자문에 필요한 설계도서를 발주기관에 제출하는 등 이에 적극 협조하여야 한다.

3) 철도박물관은 용적률, 건폐율 연동을 고려한  건축 인·허가 세부 추진계획 수립하여야 한다.

바. 하도급의 범위

1) 수급인은 발주기관으로부터 수급받은 설계용역에 대하여 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 수급인은 발주기관이 특별히 인정하는 업무에 대하여 구조, 소방, 적산 등 부분적으로 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 수급인은 하도급 대상 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

3) 하도급으로 처리할 수 있는 업무는 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 건설공사의 수량 및 견적업

다) 건축기계설비분야

라) 소방설비분야

마) 기타 발주기관이 특별히 인정하는 업무

사. 설계에 사용하는 재료

본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있어야 한다. (단, 발주기관이 요구하여 지정한 제품에 대하여 그 지정한 제품 동등 이상의 품질이 있어야 한다.)

아. 발주기관이 제공하는 자료

본 과업 수행을 위하여 발주기관이 제공하는 대지내 건축물 도면, 수도배관 등의 자료는 제공할 수 있다.

자. 설계용역 진행 중 발주기관이 필요하다고 인정하여 설계내용의 변경 또는 수정을 요구하는 경우 수급인은 정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없으며, 지체 없이 이행하여야 한다.

차. 향후 용역 완료 후 발주기관에서 설계변경 또는 추가로 설계도서를 요구하는 경우 수급인은 이에 적극 협조하여야 하며, 용역비는 추가로 지급하지 않는다.

Ⅱ. 일반지침

1. 적용기준

가. 용역의 수행은 본 과업지시서에 의하되, 세부적인 사항은 수급인이 보다 합리적인 방안으로 연구하고 발전시킨다.

나. 본 과업지시서 외에 관계 규정 및 각종 시행기준을 준수하여야 하며, 본 지침서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 지침서를 우선 적용한다.

다. 본 과업지시서에 제시된 사항은 수급인이 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 정한다.

라. 본 과업지시서에 대한 대안을 제시할 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인 후 채택할 수 있다.

마. 발주기관 및 관계부서와 긴밀한 협조체계를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도하여 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

바. 각종 계산기준은 외국의 기준을 적용할 수 있으나, 이 경우 발주기관과 협의하여야 한다.

사. 신개발공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 검토 보고서가 있어야 한다.

아. 설계도면 및 시방서에 특정 제품 및 특정 공법을 사용토록 표기할 수 없으며, 부득이한 경우에는 감독관의 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

자. 모든 설계도서에 사용되는 단위는 KS규격을 우선하며, ISO규격을 준용하고 단위는 MKS로 한다.

차. 설계도서 작성 시 「건축물의 설계도서 작성기준」, 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」에 맞도록 작성하여야 하며, 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 별표2 및 별표3의 단계별 도서 내용의 도서 작성 구분 중급을 기준으로 하되 발주기관과 협의하여 부분적으로 항목을 조정할 수 있다.

카. 「범죄예방 건축기준 고시」를 참고하여 방범에 적합한 구조로 설계한다.

2. 발주기관과 수급인의 책임 및 의무

가. 설계의 목표와 추진 절차

1) 수급인은 건설공사의 시행과정에 대한 전문적 기술 능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계·시공이 이루어지도록 해야 한다.

2) 수급인은 발주기관의 승인 없이 과업의 범위를 변경할 수 없다.

3) 수급인은 시설물과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

4) 설계용역은 관련 법규와 계약조건, 발주기관과 협의한 기본설계 조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역 수행과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 수급인은 발주기관에 보고할 책임이 있고, 관계 법규 및 계약서 검토, 발주기관과의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다. (만일, 설계 시 중대한 과오로 누락 등이 발생할 경우는 발주기관의 요구사항에 대해 수급인이 책임진다.)

5) 수급인은 언제든지 설계용역 및 시공과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주기관에 알려야 한다.

6) 수급인은 설계 및 시공과정에서 건축, 기계, 전기, 통신 등 각 공종별로 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용과 시공에 있어서 서로 상위됨이 없도록 만전을 기하여야 한다.

7) 수급인은 용역 종료 후에도 설계 도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주기관이 이에 대한 보완자료를 요구하는 경우 지체 없이 이행하여야 하며 이에 따르는 비용을 요구할 수 없다.

8) 계약의 수행 중 계약당사자 간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계 법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 중재에 대해서는 발주기관과 수급인이 서로 중재합의가 있어야만 가능하며, 분쟁 기간 중이라 할지라도 수급인은 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니 된다.

9) 수급인은 용역에 대하여 「건축사법」 제20조 제3항에 따라 보험 또는 공제에 가입한다. (용역 완수검사 요청 시 제출)

나. 공정계획

1) 수급인은 설계용역 및 시공의 공정에 대하여 공정표를 작성하여 발주기관의 승인을 받거나 발주기관이 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안한다.

2) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 발주기관이 동의한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

3) 공정계획은 용역착수 시 뿐만 아니라 용역 수행과정 및 시공에서도 항상 재검토하여 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

다. 보안성 검토

1) 수급인은 발주기관과 업무수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주기관의 승인 없이 공개해서는 아니 된다.

2) 수급인이 작성한 모든 발주기관과 관련한 성과품에 대하여는 이를 공개, 공모, 기타 다른 행위에 앞서 발주기관에 최초로 제출되어야 한다.

3) 수급인과 발주기관과의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인 창구를 단일화하고, 일정한 양식을 통하여 절차를 체계화하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

4) 수급인은 보안상 다음 사항을 준수해야 한다.

가) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.

나) 착수계 제출 시 설계 참여 관련자 전원에 대해 보안각서를 첨부한다.

다) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 아니된다.

라) 폐기물은 소각 처리해야 한다.

마) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생하는 모든 책임은 수급인에게 있다.

바) 수급인의 보안관리 및 보안대책

수급인은 본 용역설계의 설계도서․자료 등에 대한 보안관리를 철저히 하여야 하며, 다음과 같이 보안 대책을 수립․시행하여야 한다.

가. 용역사 대표자는 보안서약서(보안업무 시행세칙 별지 제38호서식)를 제출하고 용역참여자에 대한 보안서약서(별지 제39호서식)는 회사 대표자의 책임 하에 징구 제출하되 반드시 자필로 서명

나. 해당 용역에 대하여는 작업 장소(실)를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제

다. 자료 보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정·부책임자를 지정하여 관리

라. 중간 및 최종보고서 등 용역성과물(확정안 포함)은 납품물량 외 추가발행을 금지하며, 감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 비밀 또는 대외비로 분류·관리

마. 대외비 이상의 자료는 열람 기록전을 첨부하여 열람자의 범위를 파악하고 반드시 업무와 직접 관계가 있는 자에 한하여 열람

바. 용역의 정·부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때는 용역업무일지(별지 제40호서식)를 비치하여 작업내용을 기록 유지

사. 과업의 내용상 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 용역은 참여인원을 최소화 하되 정규직원에 한하여 업무를 수행

아. 용역 수행과정에서 위원회 등 회의자료에 본 과업의 내용이 포함된 경우에는 배부처를 감안하여 필요한 부수만을 생산하되, 회의 종료 후 회수하여 파기

자. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 발간하고자 할 때에는 정부비밀취급인가 업체를 이용

차. 용역참여자가 교체될 시는 인계인수를 철저히 하고, 발주처의 용역감독의 확인을 받아야 하며, 보안서약서를 제1항 제1호에 준하여 제출

카. 그 밖에 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행 상 보안관리를 요하는 사항은 용역발주 부서에서 보완 시행

1) 비밀 또는 대외비로 분류되었거나 분류하여야 할 용역 등은 제1항에도 불구하고 보안담당관에게 보안 대책의 적정성 여부를 검토 의뢰하여야 한다.

2) 계약담당직원은 계약체결 전에 제1항의 보안대책이 과업지시서에 포함되어 있는지 여부를 검토하여야 하며, 대외비 이상으로 발주 요청된 용역성과물 등 유인물에 대하여는 비밀취급인가 특례를 받지 아니한 업체와 계약 체결할 경우, 계약 즉시 비밀취급인가 특례지정을 받은 후 사업을 시행할 수 있다.

3) 제1항에도 불구하고 단순ㆍ반복작업만을 수행하고, 그 내용이 유출될 경우 공사와 관련된 피해 및 사회적ㆍ국가적 물의를 발생시키지 않는 용역에 대해서는 보안성 검토를 생략할 수 있다. 단, 이때는 과업지시서에 제1항 각 호를 참고한 보안대책을 포함시켜야 한다.

4) 감독자는 용역착수 전 제1항제1호부터 제3호까지의 이행 여부를 확인하여야 하며, 미 조치된 사항은 즉시 조치하여야 한다.

5) 감독자는 용역수행 시 보안대책의 이행여부를 월1회(정기보안진단의 날) 확인 점검하여야 하며 특히 사업의 위치선정, 노선 결정 등 주요 작업 시에는 자료관리 정·부책임자에게 작업장에서 발생하는 폐휴지 소각 및 각종 자료의 보관관리를 철저히 주지시키고 그 이행상태를 수시로 점검하여야 한다.

6) 감독자는 매분기 1회이상 용역사에 대한 현지 보안관리 상태에 대한 지도점검을 실시하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

7) 감독자는 용역 종료 시에는 성과물, 각종 제공자료 및 저장매체를 전량 회수하고 PC내 용역관련 자료를 삭제하여야 한다.

라. 계약서와의 관계

1) 발주기관과 수급인은 계약 내용의 이행에 상호 책임을 진다.

2) 발주기관의 승인으로 과업 내용 변경 시 계약 변경

가) 발주기관은 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 수급인은 발주기관의 승인이 없는 한 계약을 위반할 수 없다.

나) 과업 내용의 변경은 발주기관과 수급인이 문서화하여 상호 승인하여야하고, 이는 계약 변경의 근거 서류가 된다.

다) 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 발주기관과 수급인이 상호 협의하여 결정하기로 하며, 이때 과업 내용의 변경이 발생할 때는 “2)”항에 따른다.

마. 설계관련 현황조사

1) 수급인은 현황조사 시 기존건축물의 안전도 이상 유무, 지장물 유무, 이동 동선, 각종 설비시설 등에 대한 실사를 하여 내․외부 마감 시설의 설치, 철거 용역의 모든 단계에서 관련 규정에의 적법 여부를 검토하고 해결책을 제시하여야 한다.

2) 수급인은 기존구조물로 인하여 공사내용의 변경, 추가 등이 예상될 때, 이에 대한 상세한 조사를 통해 추가 시공물량이 발생치 않도록 한다.

바. 공사비와 예산

1) 수급인은 용역 수행 시 예정 공사비를 지속적으로 검토하고 발주기관과 협의하여 적정 공사비의 산출 및 관리에 노력해야 한다.

2) 특히, 친환경설계에 따른 추가공사비용에 대한 적정성 검토는 과업 착수단계부터 소요 예산의 증감사항에 대하여 수시 협의하고 발주기관의 승인을 얻은 후 후속 공정을 진행하여야 한다.

3) 수급인은 내·외부 마감 시설의 설치 위치에 있는 기존 시설 등 부착시설물의 재활용 및 이전 비용을 발주기관과 협의하여 이에 따른 비용을 계상하여야 하며, 기타 지장물의 철거에 필요한 비용도 포함하여야 한다.

Ⅲ. 설계지침

1. 설계 기본방향

가. 철도박물관의 건립목표와 철학 및 가치가 구현되는 상징성을 갖는 시설로 계획을 한다.

(1) 사업대상지에 조화롭고 환경친화적인 시설물을 계획한다.

(2) 시설의 비전과 역할, 그리고 미래상을 표현한다.

나. 새롭고 창의적인 디자인을 구현하여 차별화된 철도박물관의 특화 방안을 반영해야 한다.

다. 이용자의 편의성 제고 및 효율적 이용을 위하여 시설 기능이 적절하게 집·분산 배치 및 구성되도록 하며, 각 기능의 독립성은 보호하되 상호 공간간의 연계성을 극대화 하고, 접근성 및 개방성을 확보하는 설계방안을 제시한다.

라. 전체 대지가 통일성과 완결성을 가지며, 장래의 확장성을 고려하여 시간에 따라 진화 될 수 있는 마스터플랜 및 건축계획(구조 및 설비계획 포함)안을 제시한다.

마. 대상지의 환경적 특성을 적극 활용하고, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루도록 건물이 입지하여야 하며, 주변시설 연계를 고려한 설계방안을 제시한다.

바. 모든 시설 및 시스템은 FMS(Facility Management System)와 유기적으로 연동되어 실시간 감시 및 제어, 관리비용 및 에너지 절감효과, 합리적이고 효율적인 시설관리가 되도록 한다.

사. 빌딩에너지관리시스템(BEMS) 적용으로 효율적인 관리와 에너지절약이 가능하도록 시스템을 구성하며, 각종 유량계 및 시스템을 갖추어야 한다.

아. 경제성과 합리성을 고려하여, 반드시 주어진 예산범위 내에서 실행 가능한 현실성 있는 계획안을 제시한다.

□ 필요시설

구 성	내 용
전시/체험영역	전시실(차량전시영역, 일반전시영역(상설, 테마, 기획, 예비 등)), 전시준비실, 체험, 디오라마, 외부전시영역
교육/연구영역	강당, 세미나실, 교구자료실, 교육실, 도서자료실
수장영역	수장고, 전실, 준비실, 비품실, 사진실
편의영역	식당, 카페, 기념품점, 수유실, 중앙방재센터, 고객지원실
사무영역	관장실, 운영사무실(17명), 학예연구실(2명), 회의실(20석), 화장실ㆍ샤워실, 사무지원실(탕비실, 자료, 창고)
기타공용	공조기계실, 전기실, 주장비실, 복도, 엘리베이터, 계단, 홀 등
설비지원시설	-
주차시설	-

※ 공간배치 및 필요시설은 설계기본방향으로 설계 시 반영하되, 공모자의 필요에 따라 추가, 삭제할 수 있으며, 각 실은 <단위시설별 설계지침>을 준수하여야 함

< 철도박물관 설계 기본방향 >

□ 공간배치

구분	배 치 시 설
지하	기타공용	- 공조기계실, 전기실, 주장비실 등 장비의 반입, 반출이 유리하도록 구성
1층	로비/기획전시	- 철도박물관의 도입공간으로 관람 및 프로그램 안내, 상징연출공간 - 철도의 날 등 기념일, 철도 관련 행사 및 이슈 관련 전시
	철도역사관	- 철도박물관의 강력한 서사적 구조로 다양한 시각적 위치에서 관람, 순환 경로로 키오스크 및 멀티미디어 스테이션을 배치, 인너팩티브 전시의 공간 - 특별전시로 대한민국의 철도 역사의 발전사 전시 - 세계와 우리나라 철도 역사와 유물 등을 시대순으로 연출 - 국내외 철도의 발달사 및 각종기차 기록 및 철도인물 전시
	수장고	- 인쇄물, 서적, 기록문 등 회화류 수장고 - 축소모형, 철도관련 유물 공예품 등 목재 및 금속류의 수장고 - 철도관련 의복 및 액세서리, 실내장식 등 모직물류의 수장고
2층	특별전시	열차의 세계를 탐험할 수 있는 열차 디오라마, 입체적 지형, 도심, 움직이는 열차, 조명, 해설, 4계절 표현 - 공간 별 철도 직업소개 및 상황별 철도 안전체험 연출 철도교통시스템, KTX 및 기관사 양성용 시뮬레이터 설치
	미래철도관	- 미래철도(하이퍼루프 영상 등)와 진화하는 KTX의 과학적 원리 및 속도, 대한민국의 미래철도의 가상세계 경험 - 세계와 우리나라 철도산업의 개발 트랜드와 철도정책, 미래모습 전망, 유라시아 철도 소개
	식당	- 식당은 단순히 식사의 기능을 넘어, 다양한 이용객의 수용에 대응하고 체험, 휴식 등으로 철도의 콘텐츠와 연계, 음향ㆍ조명으로 심리적 안정감을 유도
3층	카페(전망대)	- 층고를 이용하여 가급적 실내로 구성, 기존 경부선 선로의 열차운행의 조망과 왕송호수의 전경을 관람할 수 있도록 공간조성
	외부공간	- 공간을 이용한 대형철도의 실물 및 목업, 시설장비 전시연출

1) 전시공간의 구성에서 기획, 특별 전시공간 마감은 단위시설별 설계지침에 따른다.

2) 전시물 설계 및 제작설치 용역은 별도발주 예정이며, 설계자는 전시물 설계자와 협업으로 설계를 진행하여야 한다.

2. 건축설계 세부지침

가. 쾌적한 환경

(1) 자연환기 및 자연채광을 고려한 최적의 전시․체험․교육․연구 환경을 조성한다.

(2) 구조물의 방수, 결로 및 배수의 합리적인 처리계획을 제시한다.

(3) 외벽의 충분한 단열을 고려하여 에너지절감을 극대화하고, 동파 피해가 없도록 하며, 적절한 습도 유지를 고려하여 설계방안을 제시한다.

(4) 대지주변이나 건축물 내 소음원 및 진동원이 있는 경우 소음 및 진동에 대한 대책을 수립하고, 소음진동관리법에 부합하도록 설계방안을 제시한다.

(5) 건물 및 공간 용도에 따른 적정 조도를 반영한다.

(6) 상주공간의 업무환경개선을 위한 설계방안을 제시한다.

나. 편의성 확보

(1) 관람객의 일시적 집중이 예상되는 공간은 동선을 원활하고 단순화 한다.

(2) 원활한 수직, 수평동선을 고려한 적정 공간 및 기능을 갖춘다.

(3) 각 공간 간의 원활한 기능적 연계 가능한 합리적인 동선체계 및 효율적 배치를 한다.

(4) 장애인·노인·임산부 등의 편의시설은 관련법에 근거하여 편의성을 최대한 고려하여 설계방안을 제시한다.

다. 보안 및 안전성 확보

(1) 건물보안 및 출입통제를 고려하여, 도난에 대해 안전하도록 방범 및 보안 관리가 용이한 구조로 계획한다.

(2) 24시간 안정적인 전산설비 및 연구장비 운영을 위해 무정전 전원공급체계 및 방재시설을 갖춘다.

(3) 주요 출입 장소 및 중요시설물에 대한 24시간 감시체계를 구축한다.

(4) 방범 관련 데이터를 통합관리시스템에 제공하여 통합운영체계를 구축한다.

(5) 주요 외부영역인 보행공간, 광장, 휴게공간 들의 각종 시설 공간계획은 무장애(Barrier Free) 개념을 고려하여 계획한다.

라. 녹색건축계획 및 에너지절감계획

(1) 지속가능한 개발을 위한 환경친화형(Green Building System) 건축물 기준 적용 및 에너지절약과 쾌적성 향상을 위한 각종 환경조절(제어) 시스템과 설비시스템을 적용하여 주어진 사업비 범위 내에서 실행 가능하도록 설계방안을 제시한다.

(2) 녹색건축 인증(일반), 제로에너지건축물 인증(4등급) 법적기준 이상을 적용하여 주어진 사업비 범위 내에서 실행 가능하도록 설계방안을 제시한다(입찰 공고일 이후 기준 강화시에도 실행 가능)

(3) 실내오염물질을 배출하지 않는 자재를 사용하여 건축환경 개선이 가능하도록 설계방안을 제시한다.

(4) 중수도시설 및 빗물활용시설, 도랑을 활용한 조경수 용수공급과 같은 친환경적인 용수시설을 경제성을 검토 한 후 도입할 수 있다.

(5) 에너지의 효율적 이용이 가능한 부분에 대하여 적극적으로 검토 후 설계에 반영한다.

(6) 기계 및 전기설비는 고효율에너지 기자재 사용 및 고효율 시스템을 반영하여 설계방안을 제시한다.

(7) 건축물의 에너지절약 설계기준에 따른 건물에너지 성능지표(EPI) 이상 취득하도록 설계방안을 제시한다.

(8) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 의한 신·재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리 등)을 비교·검토하여 최적의 시스템을 반영하여 설계방안을 제시한다.

마. 최첨단 건물 계획

(1) AI 지능사회에 능동적으로 대처할 수 있도록 가변적인 정보화 시대에 능동적으로 대처할 수 있도록 향후 20년을 고려한 계획으로 최신의 첨단 서비스를 도입한다.

(2) 다양한 분야의 최신기술을 통합하는 설계기술을 바탕으로 새로운 구조해석 설계와 기계설비·전기설비·자동제어시스템 설계가 유기적으로 결합될 수 있도록 하고, 미래 지향적으로 설계방안을 제시한다.

(3) 통합관제시스템(SI/FMS)은 통합설계 구성을 원칙으로 하여 호환성이 극대화되도록 구성한다.

(4) 건물자동화(BA), 정보통신(TC), 시설관리시스템(FMS) 체계는 방재센터에서 통합·감시·제어가 이루어지도록 설계방안을 제시한다.

(5) 정보통신기본법에 의한 통합배선을 설계에 반영한다.

바. 합리적인 운영 및 유지관리

(1) 유지관리 비용이 최소화되는 경제적인 설계방안을 제시한다.

(2) 정보·통신 서비스 제공의 유연성이 있는 인프라를 구축한다(정보·통신기술 변화에 따른 장비, 배선 교체 등을 고려한 여유 공간 계획)

(3) 모든 시설을 중앙 통제하는 통합관제실/방재센터는 행정/연구시설 등 모든 시설과 연계성을 고려한 적절한 위치로 시설의 안전 및 운영의 중앙 콘트롤타워가 될 수 있는 설계방안을 제시한다.

(4) 통합관리가 용이하도록 방재센터에 통합단말시스템과 모니터링시스템 구축을 위한 설계방안을 제시한다.

(5) 통합시스템(SI, System Integration)은 설비자동제어, 조명제어, 전력감시, 주차관제, 시설관리, 통합방범, CCTV, 통합배선, 전관방송, 빌딩안내, AV 등 분산된 시스템을 단일운영환경으로 연동하여 설치한다.

(6) 통합 SI시스템은 FMS와의 완벽한 시스템 인터페이스를 구현하고, 실시간 감시 및 제어 뿐 아니라 FMS를 활용하여 관리비용 및 에너지 절감 효과를 거둘 수 있도록 계획한다.

(7) 체계적인 방범·방재계획 계획으로 운영인원이 최소화되도록 한다

(8) 문화적이고 쾌적한 환경을 창조하고, 이를 지속할 수 있도록 사용 및 유지 관리 편의성을 도모한다.

사. 시공성 및 경제성 확보

(1) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보되도록 설계한다.

(2) 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중 등)을 수립·반영한다.

아. 최신 기술 및 관련법규 적용

(1) 미래 지향적인 기술기준을 적용한다.

(2) 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 반드시 적용한다.

자. 공사예산 최적화

(1) 경제성에 입각하여 구조, 자재, 공법, 설비 및 부대시설 등을 제시하여야 하며, 사후 유지관리 등의 경제성을 비교·검토하여 설계방안을 제시한다.

(2) 적절한 Core계획을 통한 동선의 단축 등 공용면적의 중복을 최소화 한다.

(3) 자재(철골, 철근, Con’c 강도, 유리 등) 규격을 고려한 모듈화를 통해 노임 및 자재 낭비를 최소화 한다.

(4) 시공효율 및 준공 후 효율적인 유지 보수가 될 수 있도록 설계방안을 제시한다.

(5) 장비반입을 고려한 적정 개구부 규모를 확보하고, 가급적 건물 내부에 불필요한 단차가 생기지 않도록 설계방안을 제시한다.

(6) 초기비용/유지관리 비용을 동시에 고려한 경제성이 검토된 자재를 선정하되, 우수한 품질과 계획개념을 충분히 표현할 수 있는 자재를 사용한다.

차. 전시, 체험과 수장공간의 조화성

(1) 각 종 유물의 제작, 관리, 보전의 효율성을 높일 수 있는 공간계획을 제시한다.

(2) 다양한 유물의 효율적인 수장 및 연구를 위한 유기적 연계성을 고려하고, 유물 관리의 효율성을 높일 수 있도록 설계한다.

(3) 수장고, 연구실의 합리적인 동선과 이에 따른 효율적인 공간 배치계획을 확립한다.

(4) 전시 주제에 따라 공간 변형이 용이하도록 계획한다.

(5) 각 공간 간에 합리적이고, 효율적인 동선 흐름이 확보될 수 있도록 공간계획을 수립하고 설계한다.

카. 고효율 에너지 절약형 건축자재의 도입 및 설계

(1) 에너지효율검토서는 공법·시스템 선정 및 재질·규격 등의 계획을 중간 설계 시에 제출하여 설계반영에 차질이 없도록 한다.

(2) 에너지절약형 자재 도입 및 설계 기본방향은 아래와 같다.

◦ 수장고는 연중 항온‧항습 조건이 반드시 유지되어야 하므로 에너지 효율성이 극대화 될 수 있도록 설계하여야 한다.

◦ 창호, 내‧외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열, 결로 등 에너지절약형 구조를 갖추도록 한다.

◦ 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재(예시: LED) 사용 및 고효율 시스템 설계를 원칙으로 한다.

◦ 사무·학습 환경을 최적화하여 사용자의 쾌적성과 편리성을 확보한다.

3. 배치계획

가. 토지이용

(1) 건축물을 동-서 방향으로 배치하여 서비스 공간은 남향, 전시 공간은 북향을 받도록 효율적인 채광을 고려한다.

(2) 주변의 개발계획을 고려하여 주차장은 교통 혼잡도를 줄이도록 계획한다.

(3) 철도박물관은 최고 높이는 15M 이하로 예상되므로 인근 필지의 일조권에는 지장이 없도록 계획하되 법적인 최고 높이로 설계한다.

(4) 박물관 주차장 진입로가 교통대학교 변경 예정인 정문과의 방향과 혼재 될 경우, 진출‧입 차량의 혼잡도 영향이 없도록 계획한다.

(5) 건립대지에는 전시, 교육, 연구, 수장시설, 도로 및 주차장, 기타 편의시설 등을 효율적으로 배치하여야 한다.

(6) 철도박물관 시설의 단계별 확장 공간을 고려하여 전체 배치계획에 반영한다.

나. 주 접근성

(1) 전체 배치계획상 주변 교통과의 연계, 대지의 특성을 고려하여 주 진입동선과 주 출입구를 효율적으로 계획한다.

(2) 차량을 위한 진‧출입은 보행자 동선과 분리하고, 주변 교통흐름에 영향을 최소화할 수 있도록 계획한다.

(3) 건립 대지 내 일반 차량동선은 연구‧수장시설과 관람객들에게 소음‧진동 피해 등이 없도록 계획한다.

다. 대지 내 동선

(1) 차량동선과 보행자동선은 시설물의 이용이라는 측면에서 상호보완적으로 작용해야 하며, 원활한 흐름이 가능하도록 고려한다.

(2) 계획대지 내에서 각 동선은 합리적인 체계를 가질 뿐만 아니라 상호간의 적절한 연계와 분리를 통하여 전체적으로 유기적인 관계를 갖도록 계획한다.

4. 건축계획

가. 기본사항

(1) 건축구조는 입지여건에 맞도록 충분히 검토하여 철근콘크리트조, 철골철근콘크리트조, 철골조 등을 선택한다.

(2) 기타 각 종 오수, 배수, 전기․통신 등 공동구, 인입구의 시설계획은 주변 환경을 고려하여 반영한다.

(3) 건축법, 국토의계획 및 이용에 관한 법률, 기타 관련법규에 위배되지 않아야 한다.

(4) 장애자 및 노약자를 위한 편의시설을 충분히 고려하여야 한다.

(5) 건축 설비(전기, 통신, 기계, 소방 등)는 최신식 자동관리가 될 수 있도록 구성하고, 에너지 절약형으로 설계한다.

(6) 과도한 전력부하로 인한 유지관리비용 증가를 줄이기 위해 자연환기 및 통풍, 채광이 가능한 창호 및 공간계획을 한다.

(7) 차수, 방습, 방수 및 기밀성 유지는 보수하지 않고도 사용이 가능하도록 하여야 하며 보수방법이 용이하여야 한다.

(8) 구조재가 내화성이 없을 경우, 내화 피복의 시공성과 내구성에 특별히 유의하고 소방 작업시 내화 피복이 탈락되지 않는 공법을 선정한다.

(9) 차량전시공간을 위하여 대경간 설계를 진행하는 경우 합리적 구조설계로 한다.

나. 일반사항

(1) 옥외공간은 지역사회와의 적극적인 교류, 행사지원을 고려하여 계획되어야 한다.

(2) 건축물의 일부 또는 전체를 이용하여 철도박물관을 상징하는 적절한 이미지의 랜드마크가 형성되도록 한다.

(3) 배치도와 1층 평면도에는 전면도로와 대지레벨을 표현하고, 주출입구 및 외부에 접한 출입구는 대지레벨보다 충분히 높게 계획하여 집중호우에 대비하도록 한다.

다. 동선, 조닝(Zoning) 계획

(1) 수장시설은 연구 및 운영시설과 상호간 적절한 연계가 이루어져야 한다.

(2) 수장시설과 전시‧체험‧교육시설은 출입구를 분리하고 유물이 있는 공간과 지원시설 등 허가되지 않은 자의 접근을 차단해야 한다.

(3) 수장시설에는 직원 및 방문객을 위한 일반형 엘리베이터와 유물의 운반이 충분한 화물용 엘리베이터를 별도 설치한다.

(4) 전시‧체험‧교육시설은 관람객의 접근이 용이하게 하고, 운영시설과 인접하여 관리 및 지원체계의 신속성을 확보하여야 한다.

(5) 전시‧체험‧교육시설은 노약자 및 지체장애자 등의 접근 및 관람이 용이하도록 설계되어야 한다.

(6) 주출입구에서 각 실까지 동선을 명쾌하게 계획한다.

라. 배치와 옥외영역

(1) 대지의 통신 및 전기시설, 수리시설 등을 고려하고, 기존의 지형을 효율적으로 활용한 배치계획을 수립한다.

(2) 진입광장은 방문객의 첫인상을 좌우하는 상징적인 광장으로 단체관람객으로 인한 혼잡을 줄일 수 있도록 진입광장과 휴게공간에 단체방문객 대기공간과 우천 시 비를 피할 수 있는 캐노피 시설을 계획한다.

(3) 주차공간은 단체관람객이 이용하는 버스 주차와 정차가 원활하도록 설계한다.

(4) 주차장 시설은 대·소형 분리주차를 원칙으로 계획하고, 단체관람객을 위한 버스의 행렬로 인해 진입도로가 혼잡하지 않도록 한다.

(5) 건축의 옥외공간은 다양한 이벤트의 장으로 활용한다.

(6) 비상시 주 출입구까지 비상용 차량 등이 진입하여 주․정차할 수 있도록 계획한다.

마. 평면계획

(1) 연구효율성을 극대화하고 미래의 환경변화에 탄력적으로 대처할 수 있는 합리적이고 가변성 있는 평면모듈(Module)을 선정한다.

(2) 최대한 자연채광이 이루어질 수 있도록 건물의 방위에 따른 적정 실을 배치하고, 실의 용도와 사용시간대 등을 고려하여 적절한 평면계획과 조닝(Zoning)을 계획한다.

(3) 각 시설물들은 중앙 집중관리 및 통제가 편리하며, 최소인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 한다.

(4) 공동 사용부분은 혼잡이 발생되지 않도록 명쾌한 동선분리를 한다.

(5) 실의 형태는 용도 및 기능에 적합하여야 하며 실의 장·단변 비는 에너지 절약 및 채광 등을 고려하여 계획하여야 한다.

(6) 적절한 여유 공간(홀, 로비)을 확보하여 쾌적하고 편안한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

(7) 계단, 화장실, 샤프트를 집약 배치하여 설비시스템의 효율을 극대화한다.

(8) 피난거리를 고려하여 코어(Core)를 합리적으로 계획하고, 코어면적을 최소화해서 전용면적을 증대한다.

(9) 수유실 위치는 코어 혹은 화장실에 인접 배치하여 하수배관 구배가 확보되도록 한다.

바. 단면계획

(1) 층고는 실의 기능 및 면적에 따라 최적의 높이가 되도록 계획한다.

(2) 공간별 특성을 고려하여 기능적이고 합리적인 단면계획이 되도록 한다.

(3) 자연채광이 가능한 단면계획을 고려한다.

(4) 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 상호 연관성을 가질 수 있도록 수직 동선이 원활하여야 하며, 각 용도별 및 실별 천정 높이가 다양함을 감안하여 각 실의 용도 및 기능에 적합하게 층고산정을 하여야 한다.

(5) 각 실별 층고는 구조와 설비배관을 고려하여 적합하게 구성한다.

사. 입면계획

(1) 주변 환경과의 조화를 고려한 환경 친화적 조형성을 고려한다.

(2) 미래지향적 건축조형미를 유지하며 자연채광, 환기, 조망을 충분히 고려하고 유지관리가 용이한 재료 및 시스템으로 계획한다.

(3) 건물의 용도 및 기능과 최대한 부합되는 입면을 고려 계획하고, 색채 디자인 등 시각적 환경요소를 고려하여야 한다.

(4) 미관 및 보안적인 측면을 고려하되, 열손실을 방지하고 소음 등의 영향이 없도록 계획하여야 한다.

아. 재료 및 색채계획

(1) 사용자재는 국산 K·S 규격품을 기준으로 하되 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감을 고려하여 계획한다.

(2) 시공성, 경제성을 고려하여 자재를 선정하며, 석면자재 등 인체에 유해한 자재를 사용할 수 없으며 자연 친화적인 자재를 우선하여 계획한다.

(3) 구조체는 내구성 및 내마모성을 고려하여 외기에 노출되지 않도록 하여야 한다.

(5) 자재의 지정색은 주변과 색상조화를 고려하여야 하며, 전체적인 색조를 고려하여 계획한다.

(6) 각 실은 소방법, 건축법 등을 감안하여 이에 저촉되지 않는 자재를 계획하여야 한다.

5. 건축디자인 계획

《단위시설별 설계지침》

1	전시 및 체험영역

1) 전시실은 상설전시실인 대주제를 위한 대형 전시공간과 주제전시를 위한 테마 전시공간, 기획전을 위한 다목적 전시공간, 전시내용 확장이나 기증실로 활용하기 위한 예비전시실의 공간을 보유한다.

2) 평면적 공간배치에서 나아가 보다 활동적이고 흥미로운 연출을 위해 입체적인 공간구성을 적극 반영하도록 한다. (천장· 바닥 전시 등 구상)

3) 전시실은 전시 관람객의 주의가 흐트러지지 않는 정도의 크기로 분절된 공간 형식으로 계획한다.

4) 전시는 단순 나열이 아닌 스토리 전시 배치에 따른 시설의 효과를 극대화할 수 있도록 계획하며, 전시품의 교체가 용이하도록 계획한다.

5) 유물을 접촉하거나 감각을 통해 전시내용을 이해할 수 있도록 체험 기회를 확대할 수 있는 전시로 계획한다.

6) 전시실 계획시 전시실의 폭은 전시물을 시각적으로 관람하기 쉬운 폭을 설정하여 계획하고, 관람자가 통행할 수 있는 최소 1.8m 이상의 폭을 합산하여 계획한다.

7) 최대한 장 스팬의 무주 공간을 확보하고, 충분한 바닥하중을 고려하여 중장비를 이용한 대형 전시품의 이동 및 전시도 용이하도록 계획한다.

8) 전시실의 반자높이는 최소 5m 이상이 되도록 계획한다. 단, 기획전시실의 반자높이는 최소 6m 이상이 되도록 계획한다.

9) 전시실 출입구는 다음 전시를 위한 준비 및 정보와 휴식을 제공해 줄 수 있는 전이 공간으로 제공되어야 한다.

10) 전시실 출입구는 전시물의 반·출입이 용이하도록 충분한 여유를 두어 계획한다.

11) 벽면 부착물· 모형· 대형 전시물의 배치를 전시설계와 협의하여 설계에 반영한다.

12) 테마, 기획, 상설전시(차량전시 제외) 공간의 바닥·벽·천장재의 마감재는 박물관 특성을 고려하여 저렴한 자재를 선정하여 사업비에 포함하고, 향후 전시설계과 협의 조정되어야 하는 부분에 대하여는, 인테리어 설계를 하지 않는다.

[ 상설전시실(차량전시) ]

- 설계자의 창의성을 발휘하여 계획하며, 전시 물량마다 각 전시공간의 크기가 다양하게 나타나므로, 전시실의 수평/수직적 규모를 충분히 여유를 두어 계획한다.

철도차량 전시 공간은 철도박물관의 핵심적이고 특징적인 공간이며 이 공간이 거대한 홀의 역할을 하도록 구성한다.

넓은 홀 형태의 공간을 구성하기 위해 기둥 간격을 넓혀 무주 공간을 만들고, 차량의 하중을 고려하여 1층에 배치한다.

향후 전시차량을 이동과 재배치할 수 있도록 이동 방법을 제안하고 설계 계획한다.

2층에서 차량전시 철도 차량의 상부의 관람이 가능하도록 계획한다.

[ 테마 / 기획전시실(일반) ]

- 이동 가능한 벽면(패널)/진열장들을 사용하는 것이 가능하도록 계획한다.

- 다른 박물관과의 차별성이 명확하게 전달하는 전시실이 될 수 있도록 계획해야 한다.

- 영상·음향·모형 등의 장치들을 통한 시각적/입체적 효과를 낼 수 있도록 계획한다.

- 손으로 만지거나 움직여 볼 수 있는 체험 전시물을 고려하거나, 천장을 이용하여 전시물을 붙이거나, 달아매는 전시 등도 계획한다.

- 기획전시실의 천장은 격자형 레일을 설치하고, 무빙 파티션으로 구성하여 벽면․천장 배치 및 전시조명의 설치가 자유롭게 되도록 계획한다.

- 무빙파티션의 상부 지점에 걸개를 걸 수 있도록 전시레일을 설치한다.

- 기획전시실의 바닥은 전시물의 빈번한 변화 및 설치를 고려하여 화강석 이상의 내구성이 좋은 재료로 계획한다.

- 여러 종류의 기획전에 따른 다양한 종류의 전시물의 전시에 적응할 수 있는 다목적 전시시설 환경을 갖추어야 한다.

- 기획전시물의 운반 통로는 별도 설치하며, 전시물 임시 보관을 위한 임시 보관실을 계획한다.

전시공간의 바닥·벽·천장재의 마감은 전시설계용역과 협의하여 결정한다.

[ 디오라마 / 체험 ]

- 사실적인 디오라마, 체험활동 최첨단 기술을 결합함으로써 관람객의 호응도가 가장 큰 전시시설이므로 배치계획을 고려한다.

디오라마는 위에서 아래를 내려다 보이도록 하고 관람객이 양측에서 관람할 수 있도록 둥근원형, 반원형을 고려한다.

- 디지털 시뮬레이터 체험 프로그램 공간과 디오라마 공간의 배치는 관람객의 혼잡을 고려한다.

관람객의 대기공간을 고려하고, 현장예약을 통해 운영되도록 예약과 체험의 공간의 동선을 분리되도록 계획한다.

바닥, 벽 마감재는 흡음재를 사용하고 청소가 편리하도록 계획한다.

디오라마 공간은 전시설계의 영상이나 조명 등을 고려하여 공간을 구획한다.

[ 전시 준비실 ]

- 각 전시실의 전시준비실은 개별적으로 설치하는 것을 기본으로 하여 계획하되, 설계에 따라 전시 준비에 불편이 없는 범위 내에서 통합적 구성으로 계획하는 것도 가능하다.(단, 필수면적임을 감안하여 면적을 조절해야 한다.)

- 각 코너 및 전시 공간 활용을 높일 수 있는 장소에 설치한다.

- 전시의 준비를 위해 간단한 작업이 가능하도록 바닥재 및 내부 벽을 내구성이 있는 것으로 계획하며, 작업에 따른 환기 및 청소 등이 쉽도록 계획한다.

- 상황에 따라 남은 패널과 진열장 등을 보관할 수 있는 창고의 기능을 할 수 있는 공간도 계획한다.

[ 전시실 내 휴게공간 ]

- 관람객의 피로를 완화시켜 주기 위한 전시실 내 소규모 휴게공간을 전시동선 길이 100m당 1개소를 기준으로 충분하게 반영하여 계획한다.

- 휴게공간의 위치는 전체 관람동선 사이에 배치되어야 한다.

- 다른 전시실로 이동하기 위한 통로나 계단, 휴게공간 등은 외부공간 (자연환경)과 시각적 연계 등의 방안을 적극적으로 검토하여 계획한다.

- 외부와 접하는 부분의 밝기(휘도)를 제어하여 관람객의 시각적 순응상태를 바꾸지 않도록 계획한다.

- 관람동선의 최종에 관람객이 휴식과 함께 관람 내용을 회상할 수 있는 휴게공간을 계획한다.

2	교육영역

1) 전시공간의 진입과는 구분된 독자적인 출입구 설치를 계획하며, 쉽게 접근할 수 있도록 하는 방안을 고려하여 계획한다.

2) 철도박물관은 철도자료에 대한 자료를 지속적으로 수집하여 아카이브·전시·교육·연구로 선순환하고 성장하는 박물관이다.

3) 전문 연구자들이 수집한 자료와 정보들을 아카이빙하고 이를 통해 생산된 콘텐츠를 바탕으로 전시·교육·연구가 원활히 진행될 수 있는 기능적 배분과 연계가 고려되어야 한다.

4) 장비의 이동 등 교육관 운영의 행태를 감안하여 공간계획을 수립하고, 건축 후에도 장비의 교체나 시설의 갱신에 불편이 없는 규모로 계획한다.

5) 일반인을 위한 강의를 목적으로 하는 실은 자연 채광을 적극적으로 활용하고, 내부 밝기를 균일하게 하여 강의 및 학습에 지장이 없도록 계획한다.

6) 강의 환경의 개선을 위해 충분한 차음 성능을 갖도록 계획한다.

7) 연구시설은 보안계획을 철저히 하며, 개별 출입구를 두고 관람자의 일반 접근 동선과 명확히 구분되도록 계획하며, 출입관리에 대한 별도의 보안시스템을 계획한다.

8) 작업을 위한 급수· 배기· 환기 설비 등을 계획하며, 컴퓨터의 네트워크 및 장비 배치의 효율을 위해 이중바닥과 월타입의 벽체 배선을 구성하여 계획한다.

9) 향후 설비의 증설에 대비하여 전력간선설비 및 단자함, 분전반 등은 전력량을 충분히 확보하여 계획한다.

10) 연구를 위한 큰 규모의 전시품/유물의 유입 등을 고려하여 실의 층고를 설정하고 계획한다.

[ 강 당 ]

- 강연, 세미나, 포럼, 학술대회 등이 운영될 수 있는 180석 규모의 공간으로 스크린 크기, 시야 각도, 객석 간 거리, 장애인석 등을 고려하여 계획한다.

- 스크린, 음향·조명 통제실, 영사실, 부대실로 구성하며 흡음이 가능하도록 설비되어야 한다.

[ 세미나실 ]

- 강연, 세미나, 포럼, 학술대회 등이 운영될 수 있는 50석 규모의 공간으로 스크린 크기, 시야 각도, 객석 간 거리, 장애인석 등을 고려하여 계획한다.

- 스크린, 음향·조명 통제실, 영사실, 부대실로 구성하며 흡음이 가능하도록 설비되어야 한다.

[ 교구자료실 ]

- 교육프로그램에 활용되는 교구, 교재, 실습도구를 제작·정리할 수 있도록 구성한다.

- 제작된 교구 및 시청각 자료보관, 음향기기 보관, 디지털자료·아카이브관리 교재편집을 할 수 있도록 구성한다.

- 바닥재는 내구성과 청소 용이성을 고려해서 고무계 바닥재를 사용한다.

[ 교육실 ]

- 교육실은 각종 소규모 발표 및 행사를 진행할 수 있는 규모의 40석 실로 계획한다.

- 행사 및 발표 진행을 위해, 전기·통신 및 음향·영상설비, 전면에 화이트보드 벽체를 계획한다.

- 교육실은 외부소음 및 내부차음을 고려한 마감재를 선정하도록 한다.

- 영상자료를 상영할 수 있도록 빔 프로젝터와 스크린을 설치한다.

[ 도서자료실 ]

- 도서와 자료의 보관 및 배치, 열람할 수 있는 개가식 라이브러리로 운영한다.

- 외부의 소음을 차단하고 울림 현상을 최소화하여 쾌적한 열람환경을 유지할 수 있도록 공간배치 및 내부마감 계획을 하여야 한다.

3	수장영역

1) 수장고는 각종 유물의 종류와 상태에 따라 시설과 설비면에서 매우 까다로운 건축조건을 요구하는데, 유물을 재질별로 구분하여 수장할 수 있도록 배려한다.

2) 수장고는 배치 및 구조계획상 습기 및 온도·결로·지하수 등의 영향이 가장 적은 곳에 계획한다.

3) 부문별 별도 수장시설(일반수장고, 특수수장고(고습· 저습))을 전시실과의 연계 및 작품 반·출입을 고려하여 계획한다.

4) 수장고는 유물 및 물품 반·출입에 있어 합리적인 기능성과 안전성을 필수적으로 확보하여 계획한다.

5) 관람객 동선과 구분하여 동선을 계획하며, 보안 및 안전관리가 용이하도록 계획한다.

6) 수장시설에 대한 보안 및 안전관리는 카드키 및 전자식 시건장치 사용, CCTV 등 시스템화하여 계획한다.

7) 화물엘리베이터와 수장 공간과의 적절한 연계로 작품의 수직 운반이 용이하도록 계획한다.

8) 전시품 반·출입은 하역장에서 바로 진입하도록 계획하며, 하역에서 수장까지, 또는 수장에서 전시까지도 수직 동선 이외의 동선에서 단차가 발생하지 않도록 계획한다.

9) 향후 확장 가능성을 고려하여 계획하고, 수장고내 수장 면적을 늘릴 수 있는 방법을 고려한다.

10) 화물전용 엘리베이터는 소장품 운송이 원활하도록 대형(폭3.5 x 깊이3 x 높이3.5m 이상)으로 계획한다.

[ 수장고 ]

- 수장고 내부는 수장품 종류에 따라 온습도 제어장치가 필요한 경우, 공기의 오염인자, 결로, 냉해 및 일사광의 영향이 없도록 고려하고, 항온항습시설이 필요한 경우 포함되어야 한다.

- 수장고 내부는 공조가 정지되더라도 일정기간 수장고내의 습도가 일정하게 유지되며 온도변화가 적도록 고려한다. 또한 건축법에서 정하는 내화기준 2시간 이내로 하고, 소화기는 B등급(연소액체와 기름)과 C등급(전기)화재에 대비하여 손으로 작동하는 친환경 소확약재로 유지될 수 있도록 하여야 한다.

비상전원에 연결되어 24시간 동안 감시되는 화재감지장치를 설치하고 작동위치 확인이 가능한 연기감지기와 Pull station 사용을 권장한다.

- 수장 면적 증대를 위한 추후 증설을 고려하여 반영한다.

- 바닥은 연질재를 사용하여 자료가 떨어졌을 때, 충격완화를 시킬 수 있도록하고, 공기를 오염시키지 않는 재료를 사용하며, 자료 운반에 원활한 구조로 하여야 한다.

- 결로의 피해를 방지할 수 있도록 적절한 방습 및 단열계획을 검토한다. 또한 수장고 내부로는 누수가 발생할 수 있는 배관 LINE이 관통하지 않게 한다.

- 출입문을 포함한 수장자료 이동 동선상의 문은 수장자료의 이동에 불편함이 없도록 그 크기를 고려하여야 하며 문 크기가 클 경우 문의 개폐작동이 원활하도록 한다.

- 지상층에 수장고 설치 시 도난 및 화재예방을 위하여 벽체는 충분한 두께 이상의 구조로 하고 외부창은 일체 설치하지 않도록 하며, 외부 부하를 최소화하고 단열재를 고려하여야 한다.

- 수장고는 기본적으로 아래의 요구조건을 만족하는 수준 이상의 시스템을 가지도록 계획한다.

- 대형유물 등도 수장가능하며, 중층 모빌랙을 설치․활용할 수 있도록 천정고 최소 7m 이상 확보한다.

- 마감재는 화학반응을 일으키지 않는 소재를 사용한다.

구 분	성 능
차단성	충해, 분진, 곰팡이, 콘크리트 수분, 실내 오염물질 등의 침입방지
조습성	장기간 공조가 정지하더라도 내부의 습도를 일정하게 유지
단열성	장기간 공조가 정지하더라도 내부의 온도변화의 최소 유지
내화성	외부의 화재 시에도 내부가 비상한계 온도이하로 유지
환경성	유해성분은 외부로 충분히 방출하고 내부는 청정상태 유지
수납성	한정된 공간을 효율적으로 사용할 수 있는 수납장 배치 필요
방도성	엄격한 출입관리와 도난 방지를 위한 시스템 필요
항곰팡이성	장기간 공조 정지시 곰팡이류의 발생을 억제

[ 전시준비실 ]

- 환경제어가 가능하도록 설비계획을 추진하고, 유물을 전시에 앞서 선별, 상태점검, 세척, 복원, 포장, 진열을 준비하는 공간으로서 온습도 조절이 가능하도록 계획한다.

[ 비품실 ]

- 전시·보전·관리하기 위한 지원 공간으로 기능적 효율성, 보존 안정성, 작업 안전성, 운영 편리성을 중심으로 수장고에 근접하여 설치한다.

방진, 방습 마감재 적용 및 청소가 용이한 내마감(에폭시, 비닐타일 등) 사용한다.

[ 사진실 ]

- 천장과 벽면은 반사율이 높은 무광 백색 마감으로 빛의 왜곡을 최소화 한다.

바닥은 매끄럽고 반사가 적은 비광택 마감재(고무타일, 무광에폭시 등)사용 한다.

천장 높이는최소 3.0m 이상 확보해 조명 세팅의 유연성을 보장한다.

[ 하역장 ]

- 유물의 하역을 담당하며, 20톤 규모의 트럭이 진입할 수 있도록 외부공간을 고려하여 계획한다.

- 차량 전시공간에 실물 크기의 차량 유물을 반입할 수 있도록 확보하고 트럭의 이동과 일치하는 5M이상의 높이와 4M폭 이상으로 출입문을 계획한다.

- 대형전시물의 반·출입을 용이하게 하기 위해 대형전시물 수장고와 가까이 설치한다.

- 보안의 측면에서 수장영역에 비해 비교적 약하나, 일반인의 출입은 제한할 수 있도록 계획한다.

- 철도차량전시의 하역장은 내부 차량전시와 직결되므로 평상시에는 대형버스의 주차장으로 이용될 수 있음을 감안하여 계획한다.

[ 전실 ]

- 외부와 내부의 온도·습도 차이를 완화하여 수장고의 환경 안정성을 확보한다.

- 내벽·천장은 방진 및 향균 마감(비분진성 도장, 내오염성 패널 등)을 적용한다.

4	편의영역

1) 관람객을 위한 편의시설 및 지원시설을 모두 포함한다.

2) 식당․카페테리아를 제외하고, 수유실, 고객지원실(의료지원 포함)로서 모두 인테리어 설계범위이고 단체관람객 및 가족단위 관람객의 휴게 등 충분한 편의를 위하여 효율적으로 공간을 계획한다.

3) 예상관람객 수, 건립예정지 주변 환경 및 관람객 동선을 고려한다.

[ 식당 ]

- 직원 및 관람객이 개방형식으로 이용하며, 전망이 좋고 접근이 용이한 공간에 배치한다.

식당 공간은 향후 운영계획에 따라 임대자가 진행하므로 바닥, 벽체, 천장의 마감재를 설계에 반영하지 않으며, 공간 구획에 따른 기본적 마감을 설계에 반영한다.

- 식당의 효율적인 운영을 위해 직원과 일반관람객 공간 구분이 필요하며 사용영역을 분리 계획한다

- 주방은 식자재 반입․반출을 위한 기능을 고려하여 하역동선과 연계 계획하고 외벽에 접하게 설계한다.

- 식당은 기준인원 및 배식 회전율을 고려하고 주방, 식료품창고 등을 포함하여 계획한다.

- 넓은 조망과 채광을 확보하며 벽과 천정에 흡음 성능이 우수한 재료를 적용하여 밝고 쾌적한 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

- 주방은 식품의 반입 및 잔반의 배출이 용이한 독립된 서비스 동선을 확보한다.

- 주방은 기본적인 마감재(바닥ㆍ벽ㆍ천장재)를 설치하고, 급ㆍ배수 등을 계획한다.

- 주방은 조리과정 및 음식물쓰레기로 인한 악취가 발생하지 않도록 급․배수 및 환기를 최대한 고려한다.

- 음식물 쓰레기를 건조한 상태로 배출시킬 수 있도록 탈수, 탈취가 가능한 시설을 계획한다.

[ 카페테리아 ]

- 쾌적하고 편안한 공간을 위하여 채광ㆍ조망을 고려한 배치로 중층으로 구성할 수 있다.

카페테리아 공간은 향후 운영계획에 따라 임대자가 진행하므로 바닥, 벽체, 천장의 마감재를 설계에 반영하지 않으며, 공간 구획에 따른 기본적 마감을 설계에 반영한다.

- 간단한 식사와 차, 음료 등을 제공하는 시설로 이용객의 편의를 고려한 시설이 되어야 한다.

- 적정한 실내 환경을 유지할 수 있도록 하며, 냄새와 증기에 대한 충분한 환기 시설을 갖춰야 한다.

- 식자재 반입과 폐기물 반출은 이용객 동선과 분리 계획한다.

[ 기념품점 / 고객지원실 ]

- 다양한 기념품의 진열 및 보관에 적합하도록 구성하고 관람객이 많이 이동하는 동선상에 배치하며, 적정 위치를 제안할 수 있다.

- 기념품점은 출구 동선과 자연스럽게 연계되도록 배치해 관람 후 방문이 유도되게 한다.

단순 상업 공간이 아니라 교육적ㆍ문화적 가치를 지닌 체험형 공간으로 구성한다.

고객지원실은 단순히 민원접수처를 넘어 서비스 허브로서, 관람객의 친절하고 효율적인 방문자 안전관리 등 운영지원의 전진기지로 계획한다.

[ 중앙방재센터 ]

- 박물관의 화재, 재난, 도난, 설비의 이상, 고객의 안전 등 비상상황에 대한 즉각적인 대응과 모니터링을 담당하는 통합 안전관리 시스템의 중심으로 설계한다.

- 전시관, 수장고 관람객 안전, 설비관리가 모두 연결된 통합관제실로서 기능해야 한다.

5	사무영역

1) 제반 행정 업무를 수행하는 공간으로 향후 기능 및 용도의 변화를 고려하여 공간 변경과 확장이 용이하도록 설계한다.

2) 각 공간들은 첨단 사무자동화 시스템과 중앙전산실을 중심으로 하는 완벽한 전산망이 구축되어야 한다.

3) 쾌적한 사무환경 및 친환경, 에너지절약형 공간을 고려한다.

4) 가변성 및 개방성을 확보할 수 있는 개방형 평면(Open Plan) 형식을 고려하여 계획하고 방음 효과가 우수한 경량칸막이 구조로 계획한다.

5) 운영시설은 보안을 고려하며 실별 업무의 독립성을 확보할 수 있도록 계획한다.

6) 쾌적한 업무공간으로서 가변형의 개방형 평면(Open Plan)을 사용하여 공간 효율을 높이며, 장래 직제 개편 등으로 인한 조직변경을 고려하여 융통성을 확보한다.

7) 각 부별 업무특성과 인원 구성에 적합한 공간이 계획되어야 하며, 회의시설 등 업무지원 시설과 유기적으로 연결될 수 있도록 계획한다.

8) 운영시설은 첨단 OA(Office Automation) 사무환경 조성을 위해 이중마루(OA Floor)를 고려하며, 단말기당 충분한 대역폭을 지원 가능하도록 설비 System을 구축한다.

9) 문서실, 물품창고, 휴게실(탕비실 포함)등과 연계하여 계획한다.

[ 운영사무실 ]

- 하나의 실로 구획하되, 상황에 따라서 여러 칸으로 분리하여 사용할 수 있도록 계획한다.

- 사무실은 장래 가변성에 대비하도록 하며, 칸막이벽 설치시에는 각 실이 완전히 구분· 구획될 수 있도록 계획한다. 문서창고를 설치한다.

- 사무실의 바닥은 이중바닥(Access floor)으로 계획하고, 시스템 박스를 설치하여 업무능력을 향상시킬 수 있도록 계획한다.

- 각 사무실의 LAN 설비는 충분히 확보하고, 예비율은 총 사용수량의 30% 이상을 확보하도록 한다.

- 외부로의 환기 및 외기도입이 가능한 개구부를 계획한다.

[ 관장실 ]

- 운영사무실과 근접배치를 고려하여 직원들과 원활한 업무연계가 이루어지도록 계획한다.

[ 회의실 ]

- 관장실과 운영사무실에 인접하여 20인 이상의 회의 공간을 확보하며, 회의실은 귀빈실 겸용 사용 가능하도록 한다.

- 영상, 음향, 통신 DATA회선을 설치하며 내부 마감음 흡음을 고려한다.

[ 전산실 ]

- 각 종 서버 및 전산 장비를 배치한다.

- 시스템실, 전산기계실 UPS실 등 전산관련 시설 배치를 고려하고 제한구역, 통제구역으로 하여 이중문, 방범창, CCTV 및 최신의 보안장치를 설치하고 전산실 제한구역 내에서 통제구역 내부를 볼 수 있도록 한다.

- 항혼 항습기를 설치하며 바닥에 1종 접지를 갖추도록 한다.

[ 학예사 연구실 ]

- 설계, 또는 조직에 따라 2개실 이상 분리가 가능하도록 계획한다.

- 바닥 시스템은 이중바닥 구조로 한다.(Access Floor)

- 연구실에서 컴퓨터 및 관련 기기를 사용할 수 있도록 LAN설비 및 시스템 박스의 설치를 고려하여 계획한다.

[ 화장실 / 샤워실 / 사무지원실 ]

- 철도설계지침 및 편람(국가철도공단)에 따라 설계한다.

[ 숙직실 ]

- 전시장이나 관람객 동선과는 분리하고, 중앙방재센터와는 유기적으로 연결하여 야간 비상대응 시 즉각적인 출동이 가능하도록 한다.

- 근무와 휴식이 자연스럽게 이루질 수 있도록 설계한다.

- 철도설계지침 및 편람(국가철도공단)에 따라 설계한다.

[ 용역사무실 ]

- 일반 관람객 구역과 분리하고, 관리부 출입구(후문) 또는 주차장과 인접한 관리동 1층에 배치되도록 한다.

- 숙직실, 방재센터 등 운영지원시설과 인접시켜 업무의 연계성을 높인다.

- 철도설계지침 및 편람(국가철도공단)에 따라 설계한다.

6	공용영역

1) 각각의 공용시설은 특성에 맞게 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 계획하며, 각종 관련 법규 및 시설기준에 적합하도록 계획한다.

2) 계획시 전체적인 박물관 건립계획과 연계하여 계획함으로써 내·외부적으로 시설의 기능수행을 충분히 지원할 수 있도록 계획한다.

3) 관람객의 피로도를 고려하여, 적정한 규모의 휴식 공간 및 화장실 등의 편의 공간을 제공하도록 계획한다.

4) 주 출입구와 부 출입구에는 대기홀 공간을 확보토록 한다.

5) 직원용 주 출입구와 부 출입구는 일정거리를 유지하도록 충분히 이격 배치한다.

[ 고객화장실 ]

- 남ㆍ여 화장실 출입구는 남녀 사용자의 시선이 서로 마주치지 않도록 계획하고 복도에서 내부가 보이지 않도록 계획한다.

- 남․여 화장실은 층당 각각 1개소 이상 설치하여 혼잡을 피하고 사용자의 편의를 도모한다.

[ 복도/ 계단 / 홀 ]

- 관련 법규를 준수해야 하며, 시설 이용자 수를 감안하여 각 부분에 대한 폭과 넓이를 정하고, 화재 등 재난 시 피난이 용이하도록 계획한다.

- 견고성 및 유지관리의 편이성을 고려해야 하며, 기능상의 연계를 고려하여 계획한다.

- 계단은 미끄럼 방지, 추락방지 시설 등 안전사고 방지를 위한 계획을 한다.

- 모든 계단의 핸드레일은 건축법규 이상에 준하여 설치한다.

- 장애인 및 일반인을 위한 경사로 설치시 그 경사 비율은 장애인 이용시설 설치 관련기준에 맞도록 계획하여, 기울기를 완만하게 하고 바닥은 미끄럼을 방지할 수 있는 마감재를 설치하며 핸드레일을 설치하도록 한다.

- 홀 계획 시 전시공간으로 활용할 수 있도록 천정레일(전시 걸이용) 및 전시조명 설비를 설치한다.

- 복도 및 계단실, 경사로는 외부로부터 환기가 가능하도록 계획하고, 자연채광이 가능하도록 계획한다.

- 복도에는 단차를 두지 않으며, 적정한 냉·난방을 하여 천정으로부터 결로수가 생기지 않도록 한다.

[ 엘리베이터 ]

- 장애인과 일반인이 같이 쓸 수 있는 엘리베이터를 설치해야 하며, 엘리베이터는 모든 층과 모든 기능시설에 대한 연계가 이루어져 장애인 이용시 불편함이 없도록 계획한다.

- 전시· 비품 및 시설장비의 배치 및 이동을 고려하여 별도로 화물 엘리베이터를 설치하며(화물엘리베이터는 적정 규모로 선택), 하역장 부근에 위치하여 수장고와의 수직·수평 이동 동선이 짧도록 계획한다.

- 박물관 화물용 엘리베이터는 물품 및 유물의 이동시 영향을 최소화할 수 있는 사양으로 계획한다.

- 어린이의 안전사고를 방지하기 위하여, 별도의 안전 장치를 고려하여 계획한다.(엘리베이터 내에 비상벨· 인터폰 설치)

6. 토목계획

가. 일반사항

(1) 대지조성을 위한 대지의 특성을 파악하고 홍수위, 지하수위, 토질의 특성을 고려하여 설계한다.

(2) 중수도시설 및 빗물 활용시설, 배수로를 활용한 용수이용 등 친환경적 용수시설을 검토 후 설계에 반영한다.

나. 설계기준

(1) 설계도서는 관련 법규 및 관할 행정관청의 조례, 규칙, 기준 등에 의한 인․허가에 문제가 없어야 하며 공통설계지침의 적용기준을 참조하여 설계하여야 한다.

(2) 상․하수도분야 시설의 설계는 상위계획과의 적합성에 대한 사전검토를 거쳐 설계에 반영하고, 설계기준은 환경부 제정 상수도 시설기준, 하수도 시설기준을 반영한다.

(3) 상․하수도, 도시가스 등 기존 시설물에 저촉되거나 타 계획과 관계될 경우에는 관계기관과 협의하여야 하며, 관계규정을 준수하여 설계하여야 한다.

다. 설계범위

(1) 토공계획(절․성토, 되메우기 계획)

(2) 터파기 및 기초계획, 부력 방지계획, 사면 보강계획, 흙막이계획

(3) 구조물계획(철근콘크리트옹벽, 보강토옹벽)

(4) 상하수도계획

(5) 도로 및 포장계획

(6) 그 외 대지 조성을 위한 기타사항

라. 토공설계

(1) 지반선 및 건물 지반면은 사전조사 및 현황측량을 기본으로 주변 도로계획을 충분히 검토하여 기본설계 시 합리적인 방법으로 설계자가 제시하여야 한다.

(2) 건축, 토목 및 기타구조물 잔토를 고려하여 건물 및 대지조성 계획고를 조성하여야 하며, 특히 대지경계 외곽과 접속처리가 원활하게 하여 인접지역에 피해가 없도록 설계하여야 한다.

(3) 대지횡단면은 20m간격으로 작성하며, 지반의 기복 및 구조물의 설치 등으로 필요한 경우 중간점 단면을 추가 작성한다.

(4) 토공사 시 인접건물 및 도시기반시설, 기타 지하매설물 등과 불가피하게 근접될 경우에는 구조적으로 안전한 시공방법을 충분히 검토하여 설계하여야 하며, 필요 시 관계기관과 협의하여야 한다

(5) 지반고 조성은 대지의 Level 및 건물 굴토량, 조수간만의 차, 연약지반 압밀침하량 등을 감안하여 현지 지형과 사용 목적에 맞도록 경제적인 토량 배분이 되어야 한다.

마. 터파기 및 흙막이설계

(1) 지하 터파기 굴착공법은 토목설계 일반사항을 참조하여 충분히 검토하고, 2개 이상의 공법을 비교, 검토하여 설계에 반영한다.

(2) 굴착으로 인한 지하수위 및 주변지형의 변동을 관측하고, 그에 대한 보완대책을 수립하여야 하며, 터파기 굴착으로 인한 주변 민원(진동, 소음, 비산먼지 등) 사항이 없도록 최대한 고려되어야 한다.

(3) 흙막이 가시설 구조해석

◦ 흙막이공법 및 단면 선정은 내공치수(건축 및 기타 치수)를 확보하고 내구성이 크고 안정성, 시공성 및 경제성을 고려해야 한다.

◦ 구조물의 설계에는 설계조건에 적합한 하중을 선정하여 해석하여야 한다.

◦ 가시설의 설계는 원칙적으로 지반특성, 굴착과정 및 지보재 해체단계를 고려하여 모델링 선정을 해야 한다. 특히, 토압을 고려하여 건축구조와 협력하여 건축물(지지력, 침하, sliding)의 내적∙외적으로 실제 발생거동과 근접하게 해석할 수 있는 프로그램을 사용하여 건물의 안정성 검토보고서로 제시 되어야 한다

(4) 기초처리 계획

◦ 기초처리 공법은 토질의 물리적․역학적 특성을 충분히 분석하여 토질특성에 부합되는 공법을 선택하고, 건축구조물 이용 시기, 상부 구조물의 규모 및 형태 등을 고려하여 공사기간, 시공성 및 경제성을 비교․검토하여 시공실적이 풍부하고 효과가 입증된 공법을 선정하여야 한다.

◦ 말뚝기초 또는 지내력기초 설계 시 연약지반의 부마찰력, 지진시 동하중으로 인한 기초영향 등을 고려하여 설계하여야 하고, 설계지지력 및 침하량을 만족하여야 한다.

바. 구조물 계획

(1) 특별한 사유가 없는 한 구조형식별 설계방법은 강도설계법으로 한다. 각 구조물의 설계는 구조물별 설계기준에 따라 적용하여야 한다

(2) 지하구조물에 작용하는 하중에 대해서는 토압과 수압의 영향을 분석하여 설계에 반영한다.

(3) 구조형상 및 단면은 내공 수치를 확보하고 내구성 및 내염해성이 크고, 안전성 및 시공성을 고려하여야 한다.

(4) 대지계획고 조성을 위한 콘크리트옹벽 및 보강토옹벽은 최소화하고 설계시 외적안정(전도, 활동, 침하) 및 내적안정(휨, 전단, 압축, 보강띠의 인발, 파단)에 대하여 검토하여야 한다.

(5) 조경석쌓기, 돌쌓기 등은 높이 2m이하로 계획한다

사. 하수도설계(우수계획 포함)

(1) 하수도계획은 환경부 제정 하수도 시설기준에 의하여 설계한다.

(2) 건물 주위의 지붕 우수관은 인근 우수맨홀(우수관)에 연결한다.

(3) 대지 내 강우 강도는 하수도시설 기준에 적합하도록 하여야 하며 최근 빈발하는 집중호우를 감안하여 적용하도록 한다.

(4) 하수관의 유속은 0.8～3.0m/sec내로 계획하여야 한다.

(5) 우ㆍ오수관은 토압과 상재하중에 충분히 견딜 수 있고 변형 및 부식을 최소화 할 수 있는 재질이어야 하며 수밀성이 있어야 한다.

(6) 대지주변 우수처리를 하여야 할 경우에는 이를 위한 집수시설 및 배수시설을 설계하여야 한다.

(7) 우수배제 유역도를 도면에 표기하여 우수관망 계획도와 함께 수리계산서에 첨부 제출하여야 하며 우수, 오수, 상수관이 교차하는 곳은 반드시 교차관의 매설계획에 대하여 상호 cross-check를 실시하여 시공가능 여부를 확인하여야 한다.

아. 상수도계획

(1) 상수도계획은 환경부 제정 상수도 시설기준에 의하여 설계한다.

(2) 본 사업의 급수계획은 관련기관과 협의하여 적정한 급수량을 산정하여 계획한다.

(3) 상수도 공급계획은 상위계획을 반영한다.

(4) 급수량은 1일 1인당 시간 최대급수량을, 화재시는 계획 1일 최대 급수량을 의왕시 수도급수조례에 규정된 사항을 준수하여 설계에 반영한다.

(5) 급수관로의 매설 깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 계획하여야 한다.

(6) 상수도계획에 사용되는 재료는 한국산업규격에 준하며, 자재 반입 시에는 품질을 보증하는 시험 성적서 등을 제출한다.

자. 포장 계획

(1) 대지 내 도로의 설계는『도로의 구조․시설기준에 관한 규칙』에 부합되도록 설계하고, 포장형식은 아스팔트 형식, 국토교통부『도로포장 설계시공지침』에 따라 설계 및 시공 되어야 한다.

(2) 도로의 최소곡선반경은 설계속도 20km/hr를 기준으로 하여 최소 곡선반경은 사용차량의 종류에 적합하도록 설계에 반영한다.

(3) 중량물 통과가 예상되는 암거 및 지하매설관 부분은 통과 예상차량의 하중을 설계에 반영한다.

(4) 대지 내 교통안전을 위한 과속방지시설이 필요한 경우 국토교통부 『도로안전시설 설치 및 관리지침(과속방지시설)』에 의하여 설치토록 설계하여야 하며, 과속방지시설의 표면은 반사성 도료로 도색하여야 한다.

(5) 도로 및 주차장의 가각부 처리는 도로의 폭원과 교차각, 차량의 규격 등을 고려하여 교통의 흐름이 유연하고 안정감을 줄 수 있도록 최소 곡선반경 및 차선폭을 확보하여야 한다.

(6) 도로나 구조물이 설치될 장소가 연약지반으로 침하에 의한 하자가 발생되지 않도록 연약지반 처리계획을 철저히 하여야 한다.

(7) 도로 및 주차장 포장두께, 진ㆍ출입도로 등은 관계법령에 따라 시설하여야 한다.

7. 기계설비 계획

가. 일반지침

(1) 채광 및 환기, 통풍, 출입 등을 위한 개구부를 최소화 하고, 건물 구조체에 단열, 방습하여 공조 부하량을 경감시킨다.

(2) 외부온도 및 습도, 기압에 의한 영향을 최소화 할 수 있는 공간배치를 계획한다.

(3) 에너지 절약적인 측면과 관리의 효율적인 측면을 고려한 자동제어시스템을 도입하여야 한다.

(4) 전시시설 등은 관람자에게 쾌적한 환경과 안정성을 제공하여야 하며, 전시물품의 유지관리에 적합한 공조시스템을 갖추어야 한다.

(5) 전시시설의 파티션에 따른 모듈별로 온도와 습도의 제어가 가능하도록 계획한다.

(6) 수장시설은 피폭, 지진, 우수, 침수, 누수 등 비상시에도 안전하게 기능을 수행할 수 있는 건물구조로 계획한다.

나. 공기조화 설비의 기초적 고려사항

(1) 천정면 혹은 벽면 내부에 설치되는 전등 등으로 인한 온도상승을 방지하기 위하여 공조 설비를 설치할 수 있는 구조로 설계되어야 한다.

(2) 공조기의 급․배기구는 충분히 이격시킴으로써 오염원의 실내 유입을 방지하여야 한다.

(3) 비상시 전기, 가스, 상수공급이 단절된 경우에도 소장 유물의 수장조건이 유지될 수 있는 방안을 강구한다.

(4) 실내 환경조건의 자동 모니터링과 제어가 가능하도록 설계한다.

(5) 콤프레서, 대형 모터 등 소음 및 진동을 유발하는 모든 설비에는 반드시 댐퍼 등 소음 및 진동 방지 설비를 설치하여야 한다.

(6) 절전을 대비한 연속운전을 위해 예비전원 설비와 기기를 설치한다.

(7) 외기도입량을 적게 하여 외기부하의 영향을 적게 한다.

(8) 쾌적한 관람 환경 조성을 위해 체험공간과 인접한 장소에는 기계실, 공조실 등의 소음 및 진동을 유발하는 시설을 가급적 배치하지 않는다.

(9) 소음발생 공간(기계, 전기, 발전기실, 공조실)을 1층 주요시설(전시시설 등)에 인접 설계시 영향을 최소화하도록 한다.

다. 배관 및 기계설비 관련 유의사항

(1) 습기, 상수도, 배수 파이프, 빗물홈통 등의 송수 파이프는 유물이 소장되어 있는 영역을 통과할 수 없다.

(2) 파이프들은 가능한 복도의 천장 부분을 통과하도록 설계하여야 하며, 배수설비도 유지관리가 편리하도록 계획한다.

(3) 복도와 수도설비가 있는 모든 공간에는 바닥 배수구가 있어야 하며, 모든 배수구에는 역 흐름 방지기가 장치되어야 한다.

(4) 화장실은 유물이 소장되어 있는 영역의 상부에 위치할 수 없다.

(5) 배관 및 덕트 관로는 유지보수를 위한 충분한 공간 확보를 하여야 하며, 천장 속으로 관로를 부설할 때는 천장 상부에 점검 보수 통로 공간을 계획한다.

8. 방재설비 계획

가. 일반지침

(1) 방재설비가 건축물과 연계하여 유기적으로 제 기능을 발휘하기 위한 충분한 검토 및 계획을 수립하여야 한다.

(2) 화재예방을 위한 기자재를 사용하고, 특히 모든 유물 수장고에는 방전 차단형 전기 스위치를 설치하여 실내 가스로 인한 화재를 방지하여야 한다.

(3) 화재 발생시 인명 피해 및 유물에 손상이 없어야 하므로 방재 계획은 소방 관련법규의 준수는 물론, 화재 진압시 소화용수나 소화제로부터 유물 피해에 대한 보호조치를 고려하여야 한다.

나. 화재 방지

(1) 수장고는 인접 공간에 발생한 화재로부터 완전히 차단되는 시설을 갖추어야 한다.

(2) 수장고 및 전산실의 경우, 청정 소화약제 이용한 소화시설을 갖추어야 한다.

(3) 수장고를 포함한 모든 건물 공간에는 화재 감지장치와 화재 경보장치를 설치한다.

(4) 수장고는 화재 발생 시 온도상승으로 인한 수장물의 변질 및 훼손을 방지할 수 있는 공간 및 설비계획이 되어야 한다.

(5) 수장고 등은 수장 및 유물과 전시물들이 화재 시 가연물이 되기 때문에 이들의 재질을 고려하여 감지기를 선정하여야 한다.

(6) 화재발생시 화재진압으로 인한 2차적인 피해가 없도록 방재계획을 수립한다.

(7) 소화설비의 방식은 각 실의 사용목적과 용도에 따라 소화기구, 옥내소화전, 스프링클러, 가스 소화 설비 등을 설치한다.

다. 홍수 및 누수 방지

(1) 바닥 배수장치는 배수 핏트(Pit)와 배수 펌프(Pump)를 갖추어야 한다.

(2) 수장고의 상부에 물탱크나 냉각장치 등 물 침투의 위험이 있을 경우, 수장고는 습기 감지기가 장치되어야 한다.

(3) 건물 바닥 및 천정은 완벽히 방수처리 되어야 하고 누수 감지 시설과 누수 차단 시설이 갖추어져야 한다.

(4) 누수에 대한 피해를 완전히 차단하기 위하여 수장고 위로는 어떠한 액체 파이프라인도 통과하여서는 안 되며 항온‧항습시 발생하는 응축수도 벽을 통하여 이동되도록 계획하여야 한다.

9. 건축 구조계획

가. 일반 사항

(1) 지진, 바람, 적설, 염해, 황산염, 부력 등 기준은 국내의 해당 법규를 만족하되, 그 조건 초과 시는 수치를 표시하고 그 근거와 당위성을 설명하여야 한다.

(2) 건축구조기준에 의해 풍하중 평가를 명확히 할 수 없는 경우 풍동시험을 통해 구조체와 외장재의 풍력과 풍압 등 설계하중을 평가하여야 한다.

(3) 지진, 폭우, 태풍 등 천재지변과 부분적인 폭발성 피해에도 치명적인 피해를 입지 않는 구조방식 및 재료를 사용하여야 한다.

(4) 수장시설은 피폭, 지진 등 비상시에도 안전하게 기능을 수행할 수 있는 건물구조로 설계한다.

(5) 구조체 이외의 비구조재, 공작물 등은 건축물구조기준 및 관련 기준에 따라 내진설계를 하여야 한다.

(6) 온도 팽창수축, 산성비, 자외선, 매연에 안전성이 크고, 내구성이 확보되어야 한다.

(7) 주요 구조부재는 보수, 보강 없이 장기간 사용이 가능하고, 보수․보강하면 그 사용기간을 연장하는데 지장이 없어야 한다.

(8) 기초 및 지하실 내부 부재 등 보수․보강이 어려운 구조부위는 특별히 안전성과 내구성이 보장되는 구조방식이어야 한다.

(9) 부분적인 시공 하자나 부식이 구체 안전에 큰 영향을 줄 수 있는 구조 방식을 지양한다.

(10) 중량물을 체험실로 이동할 수 있는 방법을 배려한 구조를 선택하여야 한다.

(11) 바닥구조는 처짐, 진동에 민감하지 않는 것을 채택한다. 각 실별 특성 및 구조체와 관련한 진동과 소음에 대해서는 관련 규정을 충족하는지 여부를 검토한 진동전문가의 컨설팅 보고서를 제출하여야 한다.

(12) Pile기초에서 Pile의 수평력에 대한 안전성 검토나 이질기초부분에 대해서는 토질 및 기초기술사의 검토의견서를 제출하여야 한다.

(13) 모든 구조설계도서는 건축구조기술사가 수행하고, 검토 후 날인하여 제출하여야 한다.

10. 조경계획

가. 일반사항

(1) 토목, 건축, 전기, 설비 설계도 등을 검토하여 식재기반 및 시설물이 설치될 대지의 조성 계획고, 식재 시설물 설치지역 장애물 확인, 설계 기타 시설물과의 상충여부, 설계에 반영할 사항 및 조정해야 할 사항 등을 사전에 파악하여 설계한다.

(2) 중수도시설 및 빗물활용시설, 배수로를 활용한 용수이용 등 친환경적 용수시설을 설계한다.

(3) 녹지 공간 및 경계수림, 방풍림 조성 등 조화로운 조경 및 공간계획을 설계한다.

(4) 외부 시설에 대한 환경 디자인 통합 설계(토목 우·배수시설, 보차도 포장 등)를 실시한다.

(5) 우‧오수 및 상‧하수도, 공동구와 같은 기반시설 및 토목 계획을 충분히 검토 후 설계에 반영한다.

나. 배수설계

(1) 대지의 규모, 성격, 식생 등의 조건을 충분히 파악함과 동시에 청소, 보수가 용이하게 이루어질 수 있도록 유지관리측면을 충분히 고려하여 설계한다.

(2) 표면배수로는 조경시설물의 배치계획에 영향을 주기 쉬우므로 충분히 배려하여 설계한다.

(3) 우수는 배수시설에 집수되기까지 구배계획을 실시하여 설계한다.

다. 급․관수설계

(1) 급수관의 매설위치, 관경, 관종 및 수압을 고려하여야 하며 특히 하절기에 수압저하가 일어나지 않도록 설계한다.

(2) 설계․시공상의 주의, 사용재료의 지정, 재료의 검사 유무를 검토한다.

(3) 필요시 실내· 외 관개시설(Irrigation)을 계획한다.

라. 식재지반설계

(1) 식재지반조성 설계는 대상지역의 지하구조물과 토양조사 결과를 기초로 한다.

(2) 식재지반 용토는 식물생육에 기본적으로 요구되는 이화학적 특성을 검사하고 각 특성수준이 기준에 미달할 경우에는 이를 개량하거나 적합한 토양으로 교체하여야 한다.

(3) 표토의 상태, 지하 매설물·구조물의 위치 및 깊이, 기존식생의 상태, 오염상황 등의 조사를 통한  계획을 수립한다.

(4) 건축물 및 구조물의 상단을 식재 계획시 구조물의 하중을 고려하여 설계한다.

(5) 모든 식재 공간은 식물의 최소 생육심도와 지하 배수를 고려하여 설계한다.

(6) 필요시 지하암거 형태의 배수시설을 설치한다.

마. 식재 설계

(1) 수목 식재 시 교목, 관목, 지피류를 수직으로 상층, 중층, 하층 식재로서 녹피율을 재고하여 설계한다.

(2) 수목의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.

(3) 친환경설계를 위한 수목의 생태적, 경관적 특성을 고려하여 설계한다.

(4) 수목식재 설계는 토양조사결과를 기초로 선정한다.

(5) 식재 지역의 식물기후학적 수목 특성조사 데이터를 식재 설계시 적극 활용한다.

(6) 수종 선택 시 구입 가능여부를 조사, 확인하여 선택한다.

(7) 기후 및 답압 정도를 예측하여 잔디의 종류를 선정한다.

(8) 잔디 시공방법, 종류 및 초종 선택시 경관미, 사후 유지관리를 확인하여 선택한다.

(9) 친환경설계를 위한 지피 및 초화류의 생태적, 경관적 특성을 고려하여 설계한다.

(10) 개화기에 따른 계절적 변화를 느낄 수 있는 초화류 배식계획을 수립한다.

바. 시설물 및 포장 설계

(1) ~의장등록, 특허등록제품 등 법적인 구속력이 있는 기성제품을 설계에 반영할 경우에는 제품의 소유권, 제조물 책임법(PL법) 등 법적인 문제점이 없도록 사전 협조나 조치를 취하여야 한다.

(2) 동적인 공간에 부속된 휴식시설로서의 기능, 휴식과 만남, 공개공지에 부속된 휴식기능, 공공보행로 등에 설치한다.

(3) 파고라, 벤치, 야외탁자 등은 경관시설물로서 공간구성 요소의 성격을 지니기 때문에, 주변시설이나 식재 등과의 연관을 고려하여 배치한다.

(4) 법적 안내시설(공개공지 안내표지판, 어린이 놀이시설 설치 안내판 등) 및 추후 외부 사인 계획과 병행하여 검토한다.

(5) 포장면에 요구되는 기능성 및 경관적인 특성(포장패턴, 색상디자인 등)

(6) 배수계획, 투수 가능 방안 및 안전사고 예방을 강구하여 설계한다.

(7) 성토 및 되메우기 구간은 장기 압밀 침하에 대한 대책을 강구하여야 한다.

(8) 수경시설은 각 장치가 유기적으로 결합하되 물의 연출에 중점을 두고 주변경관과 조화되어야 한다.

(9) 모든 시설은 유지관리 및 점검보수가 용이하도록 설계한다.

(10) 내구성과 안전성, 미관, 에너지 효율성을 동시에 고려하여 설계한다.

(11) 설계수질은 수경시설의 설치목적, 수경시설의 종류 및 공급원수의 수질과 수량 등을 충분히 검토하여 설정한다.

11. 관련법규 적용기준

계약상대자는 계약문서와 관련법규 그리고 최신의 정부제정 각종 공사시방서 및 기준에 의거 설계를 수행하여야 하며, 준수하여야 할 관련 공사시방서 및 기준, 법규 중 중요한 것은 다음과 같다.

❍ 건축관계법규, 지진·화산재해대책법 등

❍ 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 산업안전보건법, 엔지니어링산업진흥법

❍ 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법

❍ 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술 기준의 판단기준(산업통상자원부)

❍ 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신공사업법, 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙, 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(과학기술정보통신부)

❍ 소방기본법, 소방시설공사업법, 화재예방·소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 화재안전기준(소방청)

❍ 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률(보건복지부)

❍ 분야별(건축, 토목, 설비, 콘크리트, 가설공사 등) 표준시방서(국토교통부)

❍ 건축구조기준, 콘크리트구조설계기준(국토교통부)

❍ 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부)

❍ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부)

❍ 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부)

❍ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

❍ 녹색건축물 조성 지원법, 녹색건축 인증에 관한 규칙, 녹색건축 인증기준(국토교통부, 환경부)

❍ 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지 건축물 인증에 관한 규칙(국토교통부, 산업통상자원부)

❍ 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증심사기준 및 수수료기준 등(보건복지부, 국토교통부)

❍ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부)

❍ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법(산업통상자원부)

❍ 주차장법(국토교통부), 자전거 이용 활성화에 관한 법률(행정안전부)

❍ 건축물의 범죄예방 설계 가이드라인(국토교통부)

※ 기타 본 용역과 관련되는 제반 법령, 규칙, 예규, 훈령, 고시, 조례 등 규정

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

수급인은 성과품 작성에 있어서 설계용역 계약 시 설계서의 과업 지시서에 따르며, 납품도서와 발주도서로 구분하여 제출하고, 시공상 의문이나 문제점이 없도록 작성하되, 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

가. 설계도서 작성기준

1) 성과품 작성 : 한국철도공사 발주처의 공사 및 용역관리규정에 따라 우선 작성하고, 필요 시 「건축물의 설계도서 작성기준, 국토교통부고시 제2024-907호(2024.12.31.)」, 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침, 국토교통부고시 제2021-981호(2021.07.23.)」에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

※ 지장물 등의 철거에 필요한 행정상 절차, 철거공법의 선정, 시방규정 및 소요비용의 산정 등 제반사항을 설계보고서, 설계설명서, 내역서(일위대가 포함), 시방서, 각종 계산서 등의 성과품에 반영하여 작성한다.

2) 모든 제출 도서 및 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 얻은 후 실시한다.

3) 과업지시서에 포함되지 않은 사항은 분야별 감독관과 협의 후 작성한다.

4) 기타 관련법규 및 제반규정을 준수하여야 한다.

2. 성과품의 작성

가. 설계설명서

1) 공통분야

공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

2) 건축분야

기본계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면․입면․주요 단면 선정, 부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계 내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 동선계획, 가구 계획

3) 설비분야

주요설비, 냉․온열원, 환기, 소화, 공조덕트, 위생 등 기타설비, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부시공 및 공정계획, 세부 공사비 등

4) 전기분야(별도 발주)

전등전열, 소화설비(자동화재탐지), 옥외외등설비, 전력간선, 전기, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부 공정계획 및 공사비 등

5) 통신분야(별도 발주)

구내통신, 통합배선, 유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획 및 공사내역서 등

6) 소방설비

설계설명서, 설비도, 계통도, 도면, 공사내역서 등

7) 승강기설비

설계설명서, 설비도, 계통도, 도면, 공사내역서 등

나. 각종 계산서

구조계산서 전력하부 계산서, 조도 계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비용량계산서, 에너지절약계산서, 정화조 등 용량계산서를 포함하되 세부사항은 다음과 같다.

1) 구조계산서

가) 구조계산서는 필요시 작성하고 작성 시에는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가 용이하게 작성되어야 하며, 특히 프로그램의 입·출력 자료는 모든 CASE 별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

나) 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주기관과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

다) 구조계산서의 각 페이지 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어 계산의 적정 여부를 확인 후 서명토록 한다.

라) 구조계산 시 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정값임을 표시한다.

2) 설비분야 설계계산서

주요 장비 및 설비의 용량계산서 및 선정서, 부하계산서

3) 전기·승강기·통신분야 설계계산서

단락전류·변압기용량·비상발전기용량·배터리 및 충전기용량·전압강화·전화회선산정·방송용 앰프용량 등의 계산서, 부하계산서, 조도계산서, 화재수신반, 회로계산서 등

다. 설계도면

1) 일반사항

가) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

나) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용)과 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

다) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

라) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정 여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

마) 설계도면에는 주석(NOTE)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

바) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련있는 도면의 번호 및 도면명을 표기한다.

사) 모든 도면은 CAD 프로그램을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB에 담아 제출한다.

2) 반영사항

가) 기본구상 및 개념도(동선계획, 가구 등 실배치계획, 마감재선정 기본구상)

나) 실내재료 마감표(각 실별, 바닥, 벽, 천장 위치별 마감자재 종류, 규격, 색상, 주요 특징 명기)

다) 평면도 : 실별 평면도(축척임의) - 주 사용재료 표기

라) 시설 및 가구 배치 평면도(평면표기 불가 시) - 축척임의

마) 내부입면도 : 주요 실별 각 부분 입면도 (축척임의) - 주 사용재료 표기

바) 단면도 : 각 부분의 주요변경 위치(축척임의)

사) 실내천정도 : 각 실별 (축척임의)

아) 실내투시도 : 주요실

자) 각종상세도

차) 기타 관계도면

마. 공사시방서

1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로 국토교통부 제정 표준시방서, 건축공사 전문시방서 및 관련법규 등을 근간으로 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 건축공사 전문시방서에 없는 공종은 추가하여 보완하여야 한다.

3) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

가) 적용 범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 세부 사항

나) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

다) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

라) 관련 법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

마) 시공자가 작성하여야 할 시공상세도 목록

바) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부 사항

사) 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

아) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

자) 공사, 공정, 품질, 안전, 환경관리 등에 대한 상세사항

차) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

카) 공사 전반에 관한 주의사항 및 절차

타) 기타 주요공사 사항

4) 공사시방서 작성 시 유의사항

가) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

나) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

다) 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

라) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

마) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

바) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

사) 공사 기성에 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

아) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고 발주기관의 감독관, 계약대상자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

자) 정확한 문법을 준수하고, 오탈자, 오기 등이 없도록 작성한다.

바. 공사 내역서

1) 공사 내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 참조하여 발주기관과 협의하여 적용하여야 한다.

2) 공사비 내역서는 기획재정부 「(계약예규) 예정가격작성기준」 및 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준을 적용한다.

가) 재료비

① 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재 가격)으로 한다.

② 조달정보지에 미수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용한다.

③ 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해물품의 거래가격을 현장 조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

나) 직접노무비: 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

3) 공사비는 예정공사비를 기준으로 하며 부득이한 경우 발주기관과 협의하여 변경할 수 있다.

4) 공사비에는 지장물 이설비, 한전 인입비, 상수도 인입비, 시운전비(전기,기계) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

5) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록한다.

6) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를 인용할 수 있으나, 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

7) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

8) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련기준 및 외국사례를 참조 작성하여야 한다.

9) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

10) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부산출내역을 첨부해야 한다.

사. 기타

1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

3) 모든 보고서, 계산서, 시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. (다만, 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 등 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.)