2025 6.

「진안 학천지구 복합플랫폼 구축사업」 과 업 지 시 서

	진 안 군 [건설교통과]

목  차

제1장 총 칙

1. 과업의 개요	1

2. 설계용역의 개요	3

3. 설계용역의 일반사항	5

4. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준	6

제2장 과업의 내용

1. 일반사항	8

2. 설계진행 시 제출서류	8

3. 업무보고 및 회의	10

4. 관계기술자 협력	11

5. 조사사항	11

6. 설계변경 및 계약취소	13

7. 기타 준수사항	13

제3장 설계 지침

1. 계획방향	17

2. 일반사항	17

3. 분야별 설계 일반 지침	18

4. 주요실별 설계지침	23

5. 설계도서의 분리작성	26

6. 설계도서 표기	26

7. 도면 작성	27

8. 기타 유의사항	27

제4장 설계도서 작성요령

1. 계획 및 중간설계	28

2. 실시설계	31

3. 기타 설계도서	39

제5장 설계도서 납품목록

1. 일반사항	47

2. 계획설계 납품도서	47

3. 중간설계 납품도서	48

4. 실시설계 납품도서	48

제6장 각종서식	50

제1장		총 칙

	1		과업의 개요

1. 과업명 : 진안 학천지구 복합플랫폼 구축사업

2. 과업의 목적

▪ ‘복합플랫폼’이라는 상부 광장형 공영주차장을 조성하여 진안읍 내 대규모 오픈 스페이스를 확보하고 군민의 다양한 활동과 지역 행사의 장소로 활용함으로서 지역의 생활거점을 조성하고자 함. 또한, 대규모 공영주차장을 확보함으로서 진안고원시장 및 시장주변 다양한 행사 방문객의 부족한 주차공간 확보로 주변도로의 혼잡을 해소하고 지역경제 활성화에 기여.

3. 과업의 개요

구 분		내 용
대지위치		전북 진안군 진안읍 군상리 479-10번지 일원
지역·지구		도시지역, 제1종 일반주거지역, 제1종 지구단위계획구역
사업 범위	주요용도	자동차 관련시설(주차장)
	대지면적	6,757.24㎡
	사업면적	5,000㎡ (±5% 범위 내 조정 가능)
규모	층수	지상 1층
	구조	철근콘크리트구조, 철골철근콘크리트구조 등 적합한 구조 반영
	주차장	180대 이상
예정 공사비		금 14,975,200천원(VAT 포함)
예정 설계비		금 577,000천원(VAT 포함)
예정 설계기간		착수일로부터 5개월(150일, 공휴일 포함)

※ 총 공사비 초과 불과, 총공사비 내 설계

※ 건축규모와 주요시설은 설계용역 착수 후 발주기관과 협의 진행하며, 공모 설계도서는 설계 협의 과정에서 변경될 수 있음.

※ 제시된 설계용역비는 건축, 토목, 기계, 조경, 전기, 통신, 소방, 인테리어 등 제반분야의 설계비와 에너지관련 인증, BF인증, 신재생에너지 관련 조사비용, 협의 등 일체의 비용을 포함.

※ 예정공사비: 14,975,200천원(부가세 포함)

제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 정보통신, 인테리어, 폐기물처리 등에 대한 전체 공사비이며 공종간 배분하여 사업비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.

나. 주요 공간 세부계획(참고안)

구 분	세부시설	면적(㎡)	비 고
지상1층	주차장	4,800	자주식 주차장(차로 포함)
	관리사무실	20
	기계전기실	50
	창고	30
	공용공간	100	EV, 홀, 계단, 화장실 등
합 계(연면적)		5,000	최대 주차대수 확보(최소 180대 이상)

4. 과업의 범위

가. 본 과업지시서는 “진안 학천지구 복합플랫폼 구축사업 설계용역”에 적용한다.

나. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성하며 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 인테리어, 철거, 폐기물처리 등 전분야를 총망라한 일체의 설계로 하되, 전기부분은 전력기술관리법, 통신부분은 정보통신공사업법 등 해당분야 관련 법률 및 규정, 지침 등에 의거 설계용역 하도록 하고, 성과품의 납품은 계획설계, 중간설계, 실시설계 최종 납품으로 구분한다.

다. 용역 범위

가. 계획설계, 중간설계, 실시설계 도서 작성

나. 공사 수행을 위해 필요한 제반 설계도서 작성

다. 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따른 공사기간 산정 및 예정공정표

라. 각종 관계법령 규정에 의한 인·허가 관련서류 작성

마. 내부 규정에 의한 각종 심사 등에 대한 조치

바. 기타 설계 용역 수행과 관련하여 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

사. 각종 인증 취득 업무

아. 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관과 설계자의 협의하에 수행한다.

자. 인 ․ 허가 업무

① 본 용역의 시행에 필요한 인․허가 대행

② 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 부서를 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가를 취득하기 위한 선결 조건 등을 파악하여야 하며, 그 인허가를 추진하여야 함

③ 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성, 인장날인 등 발주기관의 업무에 적극 협조

④ 본 용역이 완료된 후라도 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조

	2		설계용역의 개요

1. 용역 기간

가. 용역 기간 : 착수일로부터 5개월 (150일, 공휴일 포함)

나. 용역 기간의 연장 : 다음과 같은 부득이한 경우에는 용역기간을 연장할 수 있다.

가. 천재지변 등 예측하지 못한 작업불가 일수가 계속될 때

나. 발주청의 부득이한 사정으로 작업 중지 또는 기간연장의 필요가 있을 때

다. 기타 부득이한 사유로 연기가 불가피하다고 발주청이 인정할 때

다. 용역의 정지 : 다음과 같은 부득이한 경우에는 용역을 일시정지 할 수 있다.

가. 용역의 수행이 계약내용과 일치하지 않는 경우

나. 인·허가 및 심의 등 각종 행정절차 이행에 상당기간 소요되는 경우로 발주청의 승인을    받았을 경우

다. 과업 수행 중 정책변경, 기술심의, 설계 VE 등 불가피한 사유가 발생시

라. 기타 부득이한 사유로 연기가 불가피하다고 발주청이 인정할 경우

라. 그 외 용역 기간에 대한 범위 및 내용은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 및 계약예규(용역계약일반조건)에 따른다.

2. 계약의 해지 : 다음과 같은 경우 일방적으로 과업의 해지를 요구할 수 있다.

가. 용역 수행자의 용역수행이 불가능하다고 판단될 때

나. 발주청의 지시에 불응하여 설계를 진행하거나 고의적인 불성실로 과업 성과를 만족하기 어려울 때

다. 용역 수행자의 귀책사유로 인하여 발주청 계획에 중대한 차질이 유발될 것으로 판단될 경우

라. 용역 수행자가 고의 또는 부주의로 설계도서 내용이 공개되거나 제반 보안규정을 준수하지 않을 경우

마. 기타 계약 조건을 위반하였을 경우

바. 그 외 계약 해제 및 해지에 대한 사항은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 및 계약예규(용역계약 일반조건)에 따른다.

3. 용역 수행

가, 용역 수행자는 본 과업지시서의 문구 해석상 계약 상대자간 차이가 있을 경우 및 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 설계자 임의로 판단해서는 안되며, 발주청과 협의를 통해 이행한다.

나. 본 과업내용서에 규정되지 않은 사항은 발주청의 관련규정 및 정부관련 법령 및 정부 제정 각종 시방서·규정 등에 따라 발주청과 협의하여 수행한다.

다, 용역 수행자는「건축서비스산업진흥법」제22조(설계의도 구현)에 따라 건축물의 설계의도가 구현될 수 있도록 건축과정에 참여하여 같은 법 시행령 제19조(건축과정에의 설계자 참여 기준 등)의 업무를 수행한다.

라. 용역 수행자는 심사위원회 및 자문위원회의 평가의견과 발주청의 요구사항을 종합하여     수정 및 보안이 필요한 경우 이를 설계에 반영한다.

마. 설계과정에서 직원 의견 수렴을 위한 설계 설명회를 실시할 경우, 설계단계별로 직원 의견 수렴결과를 적극 검토하여 설계에 반영한다.

바. 발주청은 용역 수행자에게 설계 중 이행이 완료된 부분의 설계도서를 제출·요구하여 수정·보완 지시할 수 있으며 용역 수행자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

사. 중간설계 완료 시 각종 예비인증업무 수행업체에게 중간설계 납품 도서를 제공해야 하며, 설계 진행 시 충분한 협의를 통해 필요한 예비인증을 반드시 취득하도록 한다.

아. 납품 이후에도 각종 인·허가 및 영향평가 등 타법 관련 행정절차에 따른 자료작성 업무를 적극 이행한다.

자. 모든 예비인증, 인·허가, 영향평가 등은 설계용역완료 전 취득한다.

차. 본 용역시행에 필요한 해당기관과의 협의 및 승인은 용역 수행자의 책임으로 득한다.

카. 「일반용역계약특수조건」제9조(과업내용의 추가, 변경 및 해석)에 따라 설계 중 발주청이 별도의 지침에 의하여 과업지시를 할 수 있으며, 용역 수행자는 이에 응해야 한다.

타. 용역 완료 1개월 전 발주청에 납품예정 도서를 제출하여 사전 승인을 받은 후 최종 납품한다.

파. 그 외 명시되지 않은 계약에 관한 사항은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 등에 따른다.

	3		설계용역의 일반사항

1. 설계용역의 정의

본 설계용역의 최종도면은 건축법, 소방시설 관련법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 지적법 등 관련 법규와 각종 고시 및 공고 기준에 위배됨이 없이(관계기관과의 건축협의, 소방협의 등 포함) 완료되어야 하며 법규 등이 개정되었을 경우에는 개정된 규정을 반영하여 설계하여야 한다.

2. 납품

가. 납품은 계획설계, 중간설계, 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품하도록 하되 심의·자문·협의 등 전반적인 일정에 따라 조정할 수 있다.

나. 설계자는 각종 심의, 자문, 협의에 필요한 도면 및 서류를 발주기관의 요청이 있을 경우 최소 10일전까지 제출하여야 하며, 최종성과품은 과업수행종료일 내에 납품하여야 한다.

3. 설계의 책임 및 손해배상

가. 책임 및 손해에 대하여는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부예규 제282호), 건설엔니지어링 손해보상보험 또는 공제 업무 요령(국토교통부 고시 제2023-288호), 건축사법에 따르며 보험증서 또는 공제증서를 용역 준공 시 제출하여야 한다.

나. 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될때까지 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생 되고, 중대한 설계 과오로 판단되어 발주기관에서 관계법령에 따라 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

다. 설계자는 공사 착수 시 관련기관에 제출하는 설계도서 및 관련 서류 작성에 협조하여야 한다.

라. 설계자는 공사 중 설계도서와 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

4. 관계기술자 협력

가. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

5. 설계변경 및 정산

가. 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지 시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정될 때에는 설계자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 발주기관의 방침에 따라야 한다. 이때 과업 범위의 증감이 발생할 경우에는 예산의 범위내에서 당해 계약금액을 조정할 수 있다.

나. 이때 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규 제282호 2024.3.28.일부개정) 등에 따른다.

6. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업 지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정 단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수시 보안대책을 수립하여야 한다.

(착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

	4		법령 등의 적용 및 시방서 작성기준

1. 법령 등의 적용기준

가. 설계자는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 소방시설 관련법 등 관련법규 상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 사전에 관련 기관과 문서로 협의하여야 한다.

나. 본 설계용역의 성과품은 건축법, 녹색건축물 조성지원법, 건축사법, 국가기술자격법, 엔지니어링 산업진흥법, 에너지이용합리화법, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법, 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 하수도법, 수도법, 환경영향평가법, 도로법, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률, 주차장법, 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률, 소방시설공사업법, 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기통신기본법, 전기통신사업법, 전파법, 정보통신공사업법, 소음·진동관리법, 장애인․노인․임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률, 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률, 산업안전보건법, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률, 폐기물관리법 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업과 관련 있는 관련법령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

다. 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등) 건설기술진흥법시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토 등), 국토교통부고시 : 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준, KSF1501 : 건축제도통칙, KSF1505 : 건축구성재의 기본공차, KSF1509 : 건축부품의 치수정하기 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

2. 시방서 작성 기준

가. 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별 시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

나. 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서, 토목공사 표준시방서, 건축전기설비공사 표준시방서, 건축기계설비공사 표준시방서를 기준으로 작성한다.

다. 특별시방서는 자재관련시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

제2장		과업의 내용

	1		일반사항

1. 수급인은 본 과업을 수행함에 있어 발주자와 수시로 협의하고 협의된 사항을 설계에 최대한     반영하여야 한다.

2. 수급인은 국내 타지역의 유사시설을 현장 견학하여 외관, 기능, 주요 마감자재, 유지관리, 문제점 등을 충분히 조사․분석한 후 신축 취지에 맞게 설계에 반영하여야 한다.

3. 용역수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 수급인이 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

	2		설계 진행시 제출서류

1. 착수시 : 설계자는 용역 착수 시 계약일로부터 7일 이내에 다음의 제반서류 “착수계”라 한다.)를 제출하여야 한다.

가. 착수계 1부

나. 책임기술자 선임계 1부

다. 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

라. 과업수행계획서 1부

마. 설계용역수행 조직표 1부 (연락처 기재)

바. 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 재직증명서 등 1부

사. 설계용역 예정공정표(기본 및 실시설계의 납품예정일자 명시) 1부

※ 관계법규에 의한 심의기간 및 과업지시서 내용 중 소요되는 관련기관 협의일정과 착수보고 및 중간보고일정 등을 포함

아. 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부 (분담이행자 용역수행 내역서 포함)

자. 보안각서 (보안계획서 작성 포함)

차. 하도급예정 현황 1부 (하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출)

카. 인력, 장비투입 예정현황

타. 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

2. 수급인은 착수계 제출 후 15일 이내에 착수회의를 개최하여야 하며, 해당 용역의 전반적인 사항을 책임기술자가 지정장소에서 설명하여야 한다.

3. 수급인은 예정공정표에 따라 계획설계에 대하여 감독관과 사전협의, 승인을 받아 계획 설계보고를 거쳐 수정, 보완한 후 아래의 계획설계도서를 납품한다.

가. 배치, 평면, 입면(안) 3개 대안 제출(비교검토표 포함)

나. 각 제출도서는 3개 대안별 구분하여 제출

다. 세부제출도서는 제5장 납품목록을 참조

라. 관련법규 검토서

마. 현장조사 결과보고서

바. 유사시설 견학보고서

사. 예정 개략 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

아. 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

4. 수급인은 예정공정표에 따라 중간설계에 대하여 감도관과 사전 협의, 승인을 받아 중간설계보고를 거쳐 수정, 보완한 후 아래의 중간설계도서를 납품한다.

가. 중간설계 검사원 [서식 4]

나. 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

다. 중간설계도서

라. 개략 공사비 내역서(요약본)

마. 현장조사 결과보고서

바. 지반조사보고서(조사야장, 토질조사 자료, 조사현황 사진첩 등 일체)

사. 주요공법, 장비, 자재 선정보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

아. 장애물 없는 생활환경 인증 관련 자료 및 설계반영

자. 건축물 에너지효율등급, 제로에너지 건축물 인증, 녹색건축인증 관련 자료 및 설계반영

차. 유사시설 견학보고서(현장 답사보고서 포함)

카. 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

타. 신재생에너지 적용 관련 자료 및 설계반영

5. 수급인은 예정공정표에 따라 실시설계에 대하여 감독관과 사전 협의, 승인을 받아 실시설계보고를 거쳐 수정, 보완한 후 아래의 실시설계 도서를 납품한다.

가. 실시설계 검사원 [서식 4]

나. 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

다. 실시설계도서 일체, 내부 실별 인테리어 도면(가구배치 포함)

라. 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

마. 완료보고서

바. 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다.

사. 건축인허가(협의)중 에너지관리공단 협의서(해당 시)

아. 건축물 에너지효율등급 예비인증서(1++등급), 제로에너지 건축물 인증, 녹색건축 인증

자. 장애물 없는 생활환경 예비인증서

차. 기타 발주자의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

6. 기타 서류

가. 용역의 진도보고서

- 주간공정보고 [서식 5], 월간공정보고 [서식 6]

나. 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 서류

다, 설계안전성검토

	3		업무보고 및 회의

1. 착수 보고 : 업무 착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 15일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최하고, 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

2. 계획설계 보고 : 수급인은 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

3. 중간설계 보고 : 수급인은 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

4. 실시설계 보고 : 수급인은 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

5. 수시보고

가. 주간공정보고, 월간공정보고를 [서식 5, 6]에 따라 제출하여야 한다.

나. 설계용역 진행 시 발생하는 문제점을 분석하여 해결책을 수시로 보고한다.

6. 업무회의

가. 수급인은 설계진행과 관련하여 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나. 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

다. 본 과업지시서는 기본적인 사항에 관한 것으로 수급인은 대안을 제시하고 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라. 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석하도록 하여야 한다.

마. 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주자의 지적․보완․수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

7. 기타회의

가. 발주자의 필요에 따라 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 과업수행자는 발주자의 요청이 있는 경우 수급인 부담으로 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다. 또한 지적된 사항과 요구사항은 종합하여 변경 및 보완이 필요한 경우 설계에 반영하여야 한다.

나. 설계 진행 시 문제점이 발생하거나, 계획설계, 중간설계 및 실시설계 보고에 필요한 자료를 작성․배부하고 회의를 개최한다.

	4		관계기술자 협력

1. 건축법 시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력), 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)와 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시) 11. 관계 전문기술자의 협력을 참조하여 기술자의 협력을 받아야 한다.

	5		조사사항

1. 자료조사 및 제출

가. 수급인은 계획, 중간, 실시설계 등을 진행함에 있어 자연적 물리적 여건 등 예측 가능한 모든 사항을 조사하고 충분한 자료를 수집하여 설계의 질을 높여야 하며, 안전하고 경제적이며 최신시설이 되도록 노력해야 한다. 또한 조사과정에서 조사수행원의 안전에 각별히 유의하여야 한다.

- 지적도, 대지경계 등 관계 공부, 지반조사 등 자연조건, 유사시설 및 설비현황 등

나. 수급인은 설계 전 반드시 현장 확인하고 각종 인입위치 선정 등에 있어 확인 결과를 설계에 반영하여야 한다.

2. 각종 조사사항

가. 현지답사

- 수급인은 현지 답사하여 현지 조건에 계획시설물이 적합한지를 확인하여야 한다.

- 수급인은 지형․지질, 하천 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사용 도로, 공사부지, 작업장 등의 확보 가능 여부를 판단하여야 한다.

- 현지답사 및 조사 시에는 반드시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등에 대하여 사진 또는 비디오를 찍어 사진첩에 정리하여 1부는 발주자에게 제출하며, 민원 발생 및 구조물 계획 시 참고하도록 한다.

나. 지장물 조사

- 계획구간 내 각종 지하매설물과 지상시설물을 현장 및 자료를 정확히 조사하여 설계에 반영한다.

- 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당기관과 협의하여 설비를 산출하고 사업비에 반영하여야 한다.

- 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 하여야 한다.

- 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어야 한다.

다. 배수조사

- 우수, 한수, 유수지시설, 구조물 표면수 및 지하배수와 같은 제반사항에 대한 위치 표고 등 각종 사항을 조사하여 구조물 설계에 필요한 자료로 활용할 수 있도록 한다. 특히 하절기 집중호우에 대비한 배수계획을 충분히 검토 반영하여야 한다.

라. 소음, 진동조사 (환경영향조사.

- 계획대지 주변도로에서의 소음을 측정 조사한다.

- 사업시행으로 인한 환경영향 예측 및 저감대책을 수립하여 공사 진행 중 환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서에 포함하도록 공사시방서에 반영한다.

마. 구조물 조사

- 계획대지 부근의 기존 건물을 비롯한 각종 구조물 현황 등을 조사한다.

바. 토취장 골재원 및 사토장 조사

- 공사수행 시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사 설계에 반영한다.

- 골재원의 위치, 종류, 생산량 등을 조사하여 설계에 반영한다.

- 공사수행 시기를 고려, 진주시에서 수행하고 있는 또는 추진예정인 각종 공사장에서 발생할토공량, 암굴착량, 성토량, 여유 사토량 등을 조사하여 조사내용을 감안 토취장 및 사토장을 결정 설계에 반영한다.

사. 관련계획 자료조사

- 본 과업과 관련된 제반 사업계획을 조사하여 연관성을 상세히 검토 후 반영한다.

- 계획 대지 관련 도시계획 현황과 토지이용계획 등 관련 사업계획을 조사검토하여 설계에 반영한다.

- 국내 타 유사시설 등을 현장 견학하여 외관, 기능, 주요마감자재, 유지관리 등에 대한 착안점 및 보완점 등을 충분히 조사․분석하여 설계에 반영하도록 하고, 또한 진안 지혜의 숲 도서관 신축사업의 취지에 맞게 설계하여야 한다.

아. 기타 조사사항

- 본 건축물 조성에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원문제 등을 조사 검토하여 설계에 반영한다.

	6		설계변경 및 계약취소

1. 수급인은 다음의 경우 발주자와 협의하여 설계변경 할 수 있다.

가. 발주청의 계획 변경으로 인해 과업범위가 변경된 때

나. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

다. 천재지변, 사업추진 취소 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

라. 관계기관의 협의 과정에서 변경된 때

2. 다음 사항에 해당하는 경우 계약을 취소한다.

가. 과업의 이행이 불가능하다고 인정될 때

나. 정당한 사유 없이 과업지시에 불응하여 설계를 진행할 때

다. 기타 계약조건을 위반할 때

3. 수급인은 다음 사항에 대해서는 발주자의 사전 승인을 득한 후 과업을 수행하여야 한다.

가. 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

나. 기본계획을 포함한 주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

다. 관계기관과의 협의사항

라. 기타 발주자의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

	7		기타 준수사항

1. 작업반 구성

가. 수급인은 본 과업을 수행함에 있어 전문 분야별(건축, 구조, 토목, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등) 기술자로 구성된 작업반을 편성하여 본 과업을 수행하되, 전기분야의 설계는 전력기술관리법 등 관련 법령에 따라, 소방 분야는 소방시설공사업법, 통신전자정보처리 부분은 정보통신공사업법에 따라 유자격자에 의해 업무를 수행하여야 하며, 건축분야 수급인의 총괄 관리하에 업무를 추진하고 구성원의 이력서, 조직표 등을 과업수행계획서 제출 시 발주자에게 제출하여야 한다.

나. 가.항 외 건축구조, 기계설비, 토목, 조경 등 전문분야는 등록된 국가기술자격법에 의한 해당분야 기술사 자격 소지자로 하여금 수행하도록 하되, 건축분야 수급인이 총괄하여야 한다.

다. 수급인은 본 과업의 최종설계 보고서상에 참여기술자의 명단과 실제로 참여한 업무내용을 구체적으로 명기하여 제출하여야 한다.

2. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

- ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙｣

- ｢중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령｣ 제11조

- ｢조달청 시설공사 맞춤형 서비스 관급자재 선정 운영기준｣(조달청 훈령)

- 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률

나. 수급인은 위 규정에 따라 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성하여 제출하여야 한다.

다. 수급인은 관급자재 선정심의에 필요한 자료작성 시 감독관과 긴밀히 협조하여 관급자재 선정 심의 운영에 적극 협조하여야 한다.

3. 하도급의 범위

가. 수급인은 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

나. 수급인은 발주자가 인정하는 업무에 대해 부분적으로 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 하도급 승인요청 시 명단을 포함하여 제출하여야 하며, 수급인은 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

다. 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

- 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

- 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

- 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

- 건설공사의 수량 및 견적업무

- 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

4. 에너지절약 및 BF 건축물 설계

가. 관련 규정

- 녹색건축물 조성 지원법

- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시)

- 건축물의 에너지절약설계기준(국토교통부고시)

- 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법

- 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

나. ‘건축물의 에너지절약설계기준’에 따라 설계하고 건축협의(건축허가) 신청 전 에너지관리공단과 에너지절약 사전협의 실시

- 에너지절약형 설계, 고효율에너지 기자재 사용

- 제출서류

· 건축협의 시 제출하는 에너지절약계획서에 준용하는 도면과 근거서류

· 공공기관 신축건물 에너지 관련 사업협의 신청서

· 고효율에너지기자재 적용 Check List

· 관련자료 CD, 기타 증빙서류

다. 건축물 에너지효율등급 예비인증(1++등급)에 관한 신청서, 근거 서류 등 작성․제출

라. ‘신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법’에 따른 공급의무비율 적용 설계

마. 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙에 따라 일반등급 인증을 받을 수 있도록 설계하여야 하며, 신청서와 근거 서류 등 작성․제출

바. 제로에너지 건축물 인증에 관한 신청서 근거 서류 등 작성․제출

사. 녹색건축물 인증에 관한 신청서 근거 서류 등 작성·제출

4. 보안사항

가. 수급인은 본 과업내용에 따라 작성 또는 제출되는 각종 보고서, 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 과업수행에 있어 아래와 같이 보안의무를 진다.

- 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며, 폐기물은 소각이 불가능한 경우를 제외하고는 소각처리를 원칙으로 한다.

- 보안의무 불이행으로 인하여 발주자에게 불이익이 발생한 경우에 이와 관련한 모든 책임은 수급인이 진다.

5. 정산 및 책임

가. 발주자는 수급인에게 사전 통보하고 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

나. 과업수행 중지 또는 과업내용의 증감이 발생할 경우는 당해 계약금액을 조정 또는 정산한다. 단, 과업 범위의 현저한 변경이 없이 계획, 중간 및 실시설계 결과, 과업지시 기준 공사비를 초과한 부분에 대하여는 용역비를 증액 지급하지 않는다.

다. 설계용역비가 과다 계상된 경우 발주자는 설계 납품완료 이후라도 수급인에게 반환을 요구할 수 있고 수급인은 즉시 이를 이행하여야 하며 이와 관련하여 민․형사상 소를 제기할 수 없다.

라. 용역설계에 의한 공사시공 중 아래와 같은 설계도서상의 하자로 인한 피해발생 시 수급인은 손해배상 등 그에 대한 책임을 져야 한다.

- 누락, 오류, 과다 계상 등 설계내역서가 부적절한 경우

- 수급인 및 하도급업자의 사전조사 및 자료 분석 미비 등으로 인하여 기술상 중대한 결함이 발생하여 이에 따라 경제적 손실 및 공사 진행에 지장을 초래했을 경우 등

마. 납품된 설계도서는 발주자의 승인을 득한 후 저작권 일체를 발주자의 소유로 하며 설계용역 완료(건축협의, 승인포함) 후 설계비를 정산한다.

6. 관계사항 숙지의무

가. 수급인은 본 과업지시서 내용을 포함하여 본 용역 시행과 관련한 전반사항을 숙지하고 업무를 수행하여야 하며, 이를 숙지하지 않아서 발생되는 제반 문제에 대하여 책임을 진다.

나. 수급인은 발주자의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생된 과오납 오류 등으로 인한 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대해 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 완료 후에도 이러한 사항에 대한 발주자의 수정․보완요구가 있을 때에는 수급인의 부담으로 시정․조치하여야 한다.

다. 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 건설공사 조사 및 시험규정, 한국 산업규격 등 관련 규정에 따라 발주자와 협의하여 결정하며, 이견이 있을 경우 감독자의 의견에 따른다.

라. 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주자가 필요하다고 인정하는 중요사항은 최대한 발주자의 지시에 따라 과업을 수행하여야 한다.

마. 수급인은 과업 수행 중 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 그 손실을 보상하여야 하며 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대해 책임을 진다.

바. 발주자가 수급인의 대리인이나 고용인이 과업 수행에 부적당하다고 인정할 때는 과업 수행중 이라도 즉시 교체를 명할 수 있으며, 수급인은 즉시 이를 따라야 한다.

사. 설계도서의 작성은 국토교통부 고시 설계도서 작성기준에 의하여 작성하여야 하며 설계도면에는 수급인, 검수자, 확인자 등 서명날인 하여야 한다.

아. 수급인은 건축협의 등 각종 행정절차 승인, 협의, 인허가를 완료할 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하며, 납품 후라도 행정절차 이행이 완료되어야 본 용역이 완료된 것으로 본다. 단, 발주청의 책임있는 사유로 행정절차 이행을 필할수 없은 경우 발주청이 지정하는 시기에 수급인이 행정절차를 필하는 조건으로 납품 도서를 검수하여 본 용역을 완료할 수 있다.

자. 건축평면도 작성지연으로 인한 기계설비, 전기, 소방, 통신 등 설계용역기간 축소로 과업에 영향을 끼치지 않도록 하여야 하며, 이로 인한 책임은 수급인에게 있다.

7. 기타

가. 수급인은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주자의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 다른 주요내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주자의 제출요구가 있을 경우 이에 따라야 한다.

나. 수급인은 관계 법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인해 발생하는 사고 및 손해에 대해 책임을 져야 한다.

제3장		설계 지침

	1		계획방향

1. 현 사업부지인 학천지구는 진안군만의 생태 자연 속에서 사람과 문화가 함께하는 ‘진안고원’이라는 도시브랜드에 맞추어‘ 복합문화공간 진안고원’이라는 컨셉으로 기본구상을 완료한 장소이다. 금회 제안하는 복합플랫폼은 학천지구의 2차 사업부지(1차 사업인 지혜의 숲 도서관은 실시설계 진행 중)로서 학천지구에서의 오픈스페이스로서 중요한 역할을 하는 부지이다. 복합플랫폼을 조성하여 학천지구 내 시설과 인근 진안고원시장의 부족한 주차난을 해소하고 상부에 메인 광장을 조성함으로서 진안군의 대표 광장의 역할과 동시에 다양한 지역행사 등을 개최할 예정이다. 학천지구의 기본구상과 현재 확정된 지혜의 숲 도서관과의 관계성을 고려하고 예정 된 주변시설 및 주변 지역과 조화되는 플랫폼으로서의 계획이 필요하다. 본 공모에서는 공영주차장 계획과 더불어 상부 공원형 광장의 조경 계획을 함께 제안하도록 한다.

2. 공영주차장 운영에 따른 주차대수 최대 확보 및 원활한 주차동선을 위한 효율적인 설계(인근 주차난을 해소하기 위한 목적으로 건립되는 건축물로 인근 주민과 상가 이용객의 차량 운행 및 이동 편의 제공이 우선 고려사항임)

3. 이미 인공 조성되어 있는 사업부지는 대부분이 암반지질이다. 따라서 절토를 최소화하여 공사비가 증대되지 않는 합리적인 건축계획이 필요하다. 또한 현존하는 대지의 레벨차이를 이용한 참신한 아이디어를 구상하도록 한다.

4. 주차장법, 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 진안군 조례 등 주차장 설치와 관련된 법령 및 제반 규정에 적합하도록 계획한다.

5. 시설물에 대한 이용자의 편의성과 관리자의 관리 운영에 관한 사항을 면밀히 검토하고 특히 교통약자에 대한 충분한 배려가 있도록 계획한다.

6. 각종 재난·재해 시 안전하고 원활한 피난이 가능하도록 계획하고 불의의 사고에 적절한 대처가 가능하도록 계획한다.

7. 건물의 내구성, 안전성, 시공성, 경제성 및 내진·내화구조, 유지관리 문제를 고려하여 각종 시설의 활용성, 효율성, 기능성, 전문성을 확보하고 기능을 극대화하도록 계획한다.

8. 시설계획 및 공사, 운영시 사업부지 인근 생태환경의 훼손을 최소화하는 방안으로 계획할 것

9. 시설물 내외부 마감재료는 내구성이 우수하며, 유지관리에 적합한 질감, 색채 등을 계획하도록 한다.

10. 총 공사비는 부가가치세를 포함하여 추정공사비 이내로 계획하여야 하며, 반드시 개략공사비 등을 구체적으로 산정하여 공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 계획하여 제출하여야 한다.

11. 설계안은 제출 시점 해당 관련 법령에 적합하여야 하며, 설계도서는 관계법령에 의한 인·허가 처리에 문제가 없어야 하며 제반 관련 법령 및 규정 미검토로 인한 책임은 응모자에 있다.

	2		일반사항

1. 본 지침의 내용은 최소한의 시설 요구조건으로 본 지침에서 명시되지 않은 내용은 관련 법규, 지구단위계획, 조례 및 고시 내용, 각종 영향 평가사항 등을 준수하여야 한다.

가. 본 설계지침과 관련법, 상위계획 등이 상충될 경우 관련법, 상위계획 등을 우선 적용한다.

나. 사업부지는 제1종 지구단위계획구역 내 위치하므로 지구단위계획지침을 검토. 반영하여 계획한다.

다. 사업부지는 도시지역, 제1종 일반주거지역이므로 건축법 시행령 및 진안군 건축조례에 따라 고려·계획한다.

라. 건물에너지효율등급인증, 제로에너지인증, 장애물없는생활환경인증, 녹색건축인증 등 인허가에 필요한 각종 인증제도를 고려하여 계획한다.

2. 사업의 목적, 건물의 용도 및 성격 등에 부합되도록 하며 개방문화공간의 쾌적성 및 편리성을 확보하여야 하고 관리공간은 안전성을 주요하게 고려하여야 한다.

3. 대상지의 지리적 특성을 적극 활용하여, 주변 환경 및 경관과 조화를 이루고 건물의 외형은 진안군 상징성을 반영할 수 있도록 하여야 한다.

4. 부지 주변 조망 및 접근성․ 인지성․ 사용성을 고려하여 건물을 배치하고 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 각 공간을 유기적으로 연결하며 최소비용으로 최대효과를 얻을 수 있도록 계획한다.

5. 대지가 안전성 있도록 하고 하수, 도로 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여야 하며 지하공간 설계시 지반조사를 철저히 하여 토목공사 비용 증가가 없도록 주의한다. 기존 수목, 주변의 자연환경을 보존하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 계획한다.

6. 모든 설계는 제시한 사업비 내에서 현실적으로 시공, 제작설치 등 실행 가능하여야 하며, 이에 대한 각종 자료와 근거를 제시할 수 있어야 한다.

7. 건물 내외장재는 충분한 오염방지 기능 및 내구성을 갖추어야 하며 일상 점검 및 유지관리에 용이한 재료와 구조가 되도록 계획한다.

8. 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시)에 따라 건물은 열 손실이 적으며 에너지 절약이 가능한 구조가 되도록 계획하고 전기 및 기계설비는 고효율 에너지 자재를 사용하여 향후 유지관리비용을 최소화할 수 있도록 하며 신에너지 및 재생에너지 사용 적정성을 검토하여 반영한다.

9. 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용하고 인근에 소음원이 있는 경우에는 소음에 대한 대책을 수립하여야 한다.

10. 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조 안전성을 확보하고 화재, 지진, 태풍, 해일, 홍수 등 재해에 대해 안전하고 피난에 유리하며 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 계획한다.

11. 합리적인 토지이용 및 조경포장, 조경시설물, 외부구조물, 외부옹벽, 우․오수 및 기타시설은 환경친화적으로 계획한다.

12. 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 KS규격에 따라 제작되었거나 동등 이상의 품질을 갖고 있는 것이어야 한다.

13. 사업대상지에 인접하여 주거지역 위치하므로 공사 시 주변환경에 피해(소음, 분진, 진동 등)가 최소화하도록 하는 가설 및 환경관리 방안이 마련될 수 있도록 계획한다.

[ ※ 환경부 ‘날림먼지 관리 매뉴얼’ 참조하여 저감 방안 마련. ]

14. 공사장 주변 가설물(펜스 및 가림막등)과 자재적재 등으로 보행도로가 점용되지 않도록 하는 공사장 관리 방안을 계획한다.

15. 기타 과업지시서에 명시되지 않은 시설이라도 당연히 필요하다고 판단되는 시설은 설계에 반영하여야 한다.

	3		분야별 설계 일반 지침

1. 공통사항

가. 전체 연면적은 발주자와 협의하여 조정가능하나, 예정 총공사비를 초과하지 않도록 하여야 한다.

나. 과업수행자는 설계 시 과업지시서 및 지침에 따라 용역을 수행하고 발주자가 제시한 의견을 적극 수렴․반영하여야 한다.

다. 장애물 없는 생활환경 인증 등 가장 최근의 관계법령 및 기술기준에 적합하도록 설계하고 적용하여야 한다.

라. 건축물이 최적의 기능을 발휘할 수 있도록 유사시설에 대한 조사를 실시하여 제출하고 필요한 사항은 설계에 반영하여야 한다.

마. 수급인은 건축법, 소방기본법, 항공안전법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 진안군 건축 및 도시계획관련 조례 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하여야 한다.

바. 용역의 성과품은 건설기술(설계)용역계약 특수조건 제10조(법령 등의 준수)에 따라 건축법, 건축사법, 국가기술자격법, 엔지니어링 산업진흥법, 에너지이용 합리화법, 수도법, 환경영향평가법, 내진설계기준 관련법, 도로법, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률, 하수도법, 주차장법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 전기통신사업법, 전파법, 정보통신공사업법, 소음․진동관리법 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업과 관련 있는 관련법령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 전라북도 및 진안군 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

사. 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등), 건설기술진흥법 시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 국토교통부고시 건축물의 설계도서 작성기준, 건축제도통칙 등 관련규정에 의하고 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주자와 협의 후 후속작업을 실시한다.

2. 건축계획

가. 배치계획

1) 사업부지의 전체적인 검토를 통해 접근성, 편의성, 공공성을 고려한 효율적인 배치를 계획하며, 이용 및 유지관리에 편리하도록 배치 계획한다.

2) 주변의 건축물 및 자연환경과 조화를 이루면서 주 진입도로에서 건물의 시인성과 접근성을 고려한 건축물의 배치계획으로 이용객들에게 인지도를 높일 수 있도록 계획한다.

3) 계획 시 시설의 용도, 규모 및 입지조건 등을 충분히 파악하여 효율적인 대지의 이용에 적합한 계획이 되도록 하고, 기본설계 단계에서 다음 사항에 특히 주의하여 주변 환경과 조화된 경관이 형성되도록 노력한다.

a. 지역 문화 자연적 환경 및 계획시설 부지와 주변지역성에 대한 배려

b. 이용자의 접근성 및 유입유도 등을 고려한 외부 공간 계획

c. 차량의 진출입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고 원활한 동선체계를 확립하고, 교통약자가 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획

4) 각종 행사 및 커뮤니티 활성화, 비상 시 대피를 고려한 적정 공간을 확보한다.

6) 건축물 배치 및 옥외시설 계획 시에는 녹지체계를 단절하지 않도록 조사 분석하며 사업대지 경계에 담장을 형성하기보다 보행로와 연계하여 이용자 접근성을 높이는 방안을 검토하여 계획한다.

7) 공사 중 폐기물, 위험물 등의 보관시설은 위험을 최소화하고, 반출이 용이하도록 배치하며, 안전성을 고려한다.

나. 평면계획

1) 주차장 이용목적 및 특성에 적합하도록 계획하고, 특히 지상 1층 사무실은 향후 주차장 운영방식 변경으로 인한 전산장비 비치 등 가변성에 대처할 수 있도록 하되, 쾌적하고 밝은 분위기를 조성할 수 있도록 계획한다.

2) 이용자들의 이용에 불편함이 없도록 공간구성 및 동선 계획이 효율적이어야 하며 내·외부 출입구와 그 주변에서 혼잡이 없도록 한다.

3) 공용부분(화장실, 계단실, 엘리베이터 등)은 설계자가 건축법 및 관련 법령 등에 맞게 설계해야 하며, 공용부분을 계획하고 남은 면적은 설계자가 해당 부지에 건축될 수 있는 용도의 실 등을 제안하여 설계할 수 있다.

4) 최소 180면 이상 최대한 많은 주차대수를 확보할 수 있도록 실효적인 안으로 설계자가 제안하되, 주차장법 등 관련 법규에 적합하도록 계획한다.

5) 전기차 주차장은 화재 발생시를 대비하여 최대한 외기와 인접하여 위치를 선정하고 화재관련 안전조치를 해야 하며, 전기차 주차장과의 인접배치를 고려하여 기계전기실의 위치를 계획한다.

다. 입면계획

1) 건축물 외부의 설계와 재료 마감은 건축물 형태 및 주변 경관과 조화로워야 하며, 영구적·내구적이고 개보수 시 기존 재료와의 일치를 고려하여 보수가 용이하도록 설계한다.

2) 부지의 면적에 적합한 안정적인 규모로 계획하고, 용도·기능·실용성·동질성을 갖는 입면을 고려하여 입면도에는 주요 마감재료를 표현한다.

3) 용도 및 기능별 독창성을 부여하되 전체가 동질성을 갖는 입면을 고려하여야 하며, 법적 제한 내에서 조망권, 가시권 등을 최대한 확보하여야 한다.

4) 건물의 외장재는 자연채광을 비롯하여 미관, 단열, 소음방지 및 부식에 대한 내식성 등을 고려하여야 하고 풍압과 지진 등의 외력에 대응할 수 있도록 하여야 한다.

5) 채광 및 환기를 고려하여 개폐율이 높은 창호를 설치하여야 하며, 단열 등을 통하여 에너지절약 및 쾌적한 환경 조성이 가능하도록 계획하여야 한다.

라. 단면계획

1) 공간 특성에 맞는 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립적이면서 기능상 상호 유기적 관계가 되도록 수직 동선을 고려한다.

2) 주차장 관련 법규, 설비시스템 등을 고려한 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간으로 계획하고, 교통약자의 수직·수평 이동에 불편이 없도록 계획한다.

마. 동선계획

동선계획은 자동차의 이동동선, 이용자의 보행동선, 주차장 관리상의 동선 등을 고려하여 동선 간의 교차지점이 적으며, 안전하고 원활한 이용이 가능하도록 아래 사항에 대해 충분히 검토하여 계획을 수립한다.

1) 자동차의 교통 동선 처리

가) 차로는 가능한 한 일방통행으로 하되, 주된 동선상 차로 폭은 6m 이상 확보하여 차량의 교행에 지장이 없도록 한다.

나) 자동차의 동선은 가능한 한 단순하게 한다.

다) 입구·출구와 각 주차와의 거리는 가능한 한 짧게 한다.

라) 입차로와 출차로의 동선이 반대 방향인 배치는 가능한 한 피한다.

2) 이용자의 보행 동선 처리

가) 주차장 내 엘리베이터, 지상 출입구, 피난 계단 등 제 시설까지의 보행 거리는 적극적으로 짧게 한다.

나) 보행 동선과 자동차의 교통 동선의 교차는 가능한 한 피한다.

다) 학천지구 내 인근 시설로의 보행 접근이 용이하도록 한다.

라) 장애인 주차구역은 접근이 용이한 주출입구 및 엘리베이터와 가깝게 배치한다.

3) 주차장 관리상의 동선 처리

가) 주차장 이용률 변화에 따른 자동차 동선 변화에 대응할 수 있도록 한다.

나) 요금 징수 업무의 동선은 단순하게 한다.

다) 주차 관리원과 일반 이용자의 동선은 분리하는 것을 원칙으로 한다.

라) 유지관리시설에 있어서 동선은 일반 이용자의 동선과 분리하는 것을 원칙으로 한다.

바. 토지이용계획

1) 사업대지는 평평하나 지형 및 단차 등을 면밀히 조사 분석하여 합리적인 동선체계 및 단면계획을 한다.

2) 옥외 주차장, 진입마당, 조경 및 휴게공간 등 구체적인 외부공간의 종류와 개략적인 규모를 도면에 명시하여 외부공간 활용방안을 구체적으로 제시한다.

3) 주민들이 이용가능한 다양한 옥외 휴게공간 및 편의시설을 조성하여 지역 활성화에 기여하도록 계획한다.

4) 부지 내 공지는 휴식공간으로 제공할 수 있도록 계획하여야 한다.

사. 구조계획

1) 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하여야 하며, 특수구조이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우에는 이를 객관적으로 인정할 수 있어야 한다.

2) 내진과 내풍에 대한 안정성 확보와 중력하중 및 횡하중에 대하여 충분한 내력을 갖추며, 각종 변형에 충분히 대처할 수 있도록 하여야 한다.

3. 토목 및 조경계획

가. 토목계획

1) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 각종 규제조치를 초과하지 않도록 굴착형식을 선정하여야 한다.

2) 도로 및 보도의 포장은 친환경성, 안전성, 시공성, 경제성, 유지관리, 사용자의 편의성 등을 고려하여 적정 포장재를 선정하도록 하며, 포장단면은 동결지수, 교통량, 토질조건 등을 고려하여 계획한다.

3) 공사부지 현황에 대한 기본조사, 지반조사를 계획설계 시 수행하되, 이에 수반되는 모든 비용은 설계용역비에 포함되어 있다.

나. 조경계획

1) 부지의 여유공간에는 주변 환경과 어울리는 녹지계획을 수립하며, 적절한 휴식공간 및 녹지공간을 계획하여야 한다.

2) 옥상조경, 실내조경 등은 친환경적으로 계획을 하되 유지관리 등을 고려하여야 한다.

3) 수목생육을 감안하여 적정한 토심을 확보하고 수목의 특성을 고려하여 배식하여야 한다.

4. 기계설비·전기설비·정보통신계획

가. 기계설비계획

1) 대상 부지 주변의 열공급․하수처리․급수․도시가스 등의 기반시설을 파악하고 이를 적극 활용할 수 있도록 하여야 한다.

2) 건물 규모, 유지관리 효율성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여 급수, 급탕, 배수, 통기 등의 위생설비 계획을 세우고 적합한 시스템을 계획하여야 한다.

3) 급수 및 소방설비는 단수 및 정전될 경우를 고려하여 즉각적인 대처가 가능하도록 하여야 한다.

4) 소방설비는 인명의 안전과 경제성을 고려하여 대응이 용이하도록 하여야 한다.

5) 장비특성을 고려한 조닝으로 고장 발생 시 전체적인 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

나. 전기설비계획

1) 전기실은 유지관리를 고려하여 충분한 공간을 확보하고 침수로 인한 피해가 발생하지 않도록 유의하되, 특히 펌프실 등 물을 사용하는 장소와는 완전하게 분리하여 구획하여야 한다.

2) PS는 전기용(EPS)과 정보통신용(TPS)을 별도로 계획한다.

3) 수전설비

· 특고압 수전설비는 정식 수전설비로 설계하여야 하고, 수전전압, 부하용량, 특성, 간선손실, 전압강하 등을 고려하여 절연방식과 변전방식을 선택한다.

· 수전용량은 각 실의 면적, 기기, 동력, 부하의 특성, 수용률, 향후 부하증가 등 운전 조건을 충분히 고려하여야 한다.

4) 조명설비는 주변부와 어울리게 합리적으로 계획하여야 한다.

5) 전기설계는 관련된 건축, 기계, 통신 등 모든 분야에 상호 적합한 호환성을 가지며 관련 부하에 전원이 공급될 수 있도록 하여야 한다.

다. 정보통신계획

1)  정보통신설비는 각 실내에서 사무자동화 시스템을 검토하고 시설관리시스템(FMS)은 전력자동제어, 조명자동제어 등 향후 정보통신설비의 증설 및 신개발 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유롭게 설치 가능하도록 계획하여야 한다.

5. 기타계획

가. 보안설비계획

1)  통합보안설비는 출입통제, CCTV, A/V(전관방송) 등을 수용하여 계획한다.

나. 공사비 원가절감을 고려한 계획

1) VE(가치공학) 개념을 도입하여 과다한 구조물의 발생을 사전에 억제하고 공사예산이 절약되며, 기능의 최적화를 고려한 설계안을 작성한다.

2) 유관시설을 집중화하고 동선을 최소화하여 원자재의 사용량을 절감할 수 있어야 한다.

3) 난방 효율 등을 고려하여 유지관리에 따른 비용을 절감할 수 있어야 한다.

4) 모듈 설정 시 자재 모듈을 고려한 계획으로 노임 및 자재 낭비를 최소화하여야 한다.

다. 주차 및 방범보안계획

1) 겨울에 주차장 기능을 유지하기 위하여 출입구 주변에 제설, 동결 방지 등에 대한 대책을 강구하여야 한다.

2) 주차장에는 우천 시에 주차장 내부에 우수 등의 유입이 되지 않도록 하고, 필요한 유수 방지 대책을 강구하여야 한다.

3) 확장형 주차단위구획(30% 이상), 장애인 전용주차장(3% 이상), 전기차 충전시설 및 환경친화적 자동차 전용주차구역(5% 이상), 여성전용주차장(주차대수10%이상), 국가유공자주차장(1면)은 법적인 검토를 통하여 반영하도록 한다.

4) 주차장에는 필요에 응하는 관리용 시설을 설치하여야 한다.

5) 야간 등 필요 시 외부인 출입 통제가 원활히 될 수 있는 구조로 계획하도록 한다.

6) 각 실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 방범 성능을 발휘할 수 있도록 계획하도록 한다.

7) 출입구 및 방범 취약지역을 중심으로 CCTV가 설치될 수 있도록 하고, 생활범죄 방지 및 안전성 확보를 위해 시야를 가리는 시설물은 지양하고 열린 공간으로 계획하는 등 구축 등 효율적인 방범 및 보안계획을 수립하도록 한다.

라. 주요자재 계획

1) 주요자재는 시공후 효율적인 건축물의 유지관리를 위하여 유사한 성능의 자재 중 경제성 및 유지관리의 편리성 등 생애주기비용을 고려하여 적합한 자재를 선정 반영하도록 한다.

2) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재중에서 선정하도록 한다.

3) 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하도록 한다.

4) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하도록 한다.

5) 주요공정별 1개품목 구매금액이 1천만원 이상인 자재는 경제성, 성능 및 품질 등을 검토하여 전북특별자치도 지역 생산 자재를 우선 반영하도록 한다.

라. 기타 유의사항

1) (표지체계) 필요에 따라 시설의 이용에 편리하도록 표지 체계를 설계하되, 일반용과 장애인용, 경차전용, 환경친화적 자동차용으로 구분하여 계획한다.

2) (안전시설 등) 출입구 경광등, 반사경, 안전표식(마감자재, 색채계획) 등 안전시설물 배치계획을 적절히 수립하여 주차장 진·출입 시, 주차장 내부 등에서 안전사고가 발생하지 않도록 계획하고, CCTV를 설치하여 사각지역이 발생하지 않도록 계획한다.

3) 주차장에는 이용자의 편의를 도모하기 위한 화장실, 엘리베이터 등의 서비스 시설의 정비 상황을 고려하여 필요한 시설을 설치한다.

4) (옥외 게시판 등) 필요에 따라 도로에서 쉽게 볼 수 있도록 옥외 전광판, 간판 및 현수막 등을 설치할 수 있는 장치를 적절한 위치에 계획한다.

5) 장애인 이용에 불편이 없도록 장애인편의시설 계획을 수립하고 “장애물 없는 생활환경 인증(BF인증)” 우수등급 이상 취득하도록 설계할 것

6) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화되는 일이 없도록 설계할 것

7) 다중이 이용하는 시설이므로 내진설계가 되도록 하고, 재해 및 재난 시 안전하고 원활한 대피가 되도록 설계할 것

8) 구조 검토 시 각종 기계설비 하중을 고려할 것

9) 공사 시 주변 환경에 피해(소음, 분진, 진동 등)가 최소화하도록 하는 가설 및 환경관리 방안이 마련될 수 있도록 계획 [※ 환경부 ‘날림먼지 관리 매뉴얼’ 참조하여 저감방안 마련] 할 것

	4		설계도서의 분리작성

1. 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하고 발주 단위별(건축·토목·조경·기계설비, 전기, 통신, 소방)로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

2. 발주 단위에 대하여는 필요시 작성 전 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

	5		설계도서의 표기

1. 설계도서에 사용하는 언어는 (계약예규) 용역계약 일반조건 제2장 제5조에 의한다.

2. 약어를 사용하는 경우에는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다. 또한 설계도면에서 1~2회 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 한다.

3. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

가. 건축도면 : A

나. 건축구조도면 : S

다. 토목도면 : C

라. 조경도면 : L

마. 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

바. 전기도면 : E (전기소방 : EF)

사. 통신도면 : ET

	6		도면 작성

1. 도면규격은 「제5장. 설계도서 납품목록」을 참고한다.

2. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

3. 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

4. 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 완료보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

5. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

가. 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

나. 각종 부착시설물의 표시

다. 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

라. 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

마. 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

	7		기타 유의사항

1. 수급인은 중간 설계 완료 이전에 득하여야 할 각종 심의 및 협의를 득하고 관련 법규를 충분히 검토하여 관련 규정에 저촉되어 시행 불가능한 내용이 되어서는 아니 되며 기반조사 등 각종 조사를 실시하여 그 결과를 설계에 반영하여 중간설계 성과품을 납품하여야 한다.

2. 전체 내부에 인테리어 설계 및 가구배치 등을 발주자와 협의하여 인테리어 설계가 될 수 있도록 한다.

3. 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

4. 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

5. 토공 설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토 반영하여야 한다.

6. 본 사업과 관련하여 특별히 고려하고 주의해야 할 사항, 발주자의 요구사항에 대해서는 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 하며 조사내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독관 요구에 따라 보완, 수정, 전면 재검토하며, 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면으로 제출하여 감독관 승인을 득한 후 추진한다.

7. 현장전경, 레벨 등 주요사항에 대해 촬영․기록하여야 하며, 조사 중 하자발생 시 수급인 부담으로 보완하여야 한다.

제4장		설계도서 작성요령

	1		계획 및 중간설계

1. “계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관 분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다.)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

가. 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 발주자의 승인을 받은 후 계획설계를 진행한다.

나. 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완 제출하여 발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

2. 중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다.”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주자부터 승인을 받는 단계이다.

가. 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

나. 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

다. 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시한다.

라. 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

3. 설계(안) 작성시 포함사항

가. 건축분야

- 설계도서(관련도면, 설계설명서, 보고서 등)

- 개략공사비 산출

- 공사기간 산정

- 기타 조사자료

나. 토목분야

- 설계도서(구조 및 수리계산서, 현황측량도에 의한 설계도면, 설계보고서 등)

- 지반조사 및 보고서 작성

- 단지 내 지장물 조사

- 상․하수도 처리계획

- 구조 및 수리계산

- 가로망계획(부지 내․외)

- 개략공사비 산출

- 기타 조사자료

다. 조경분야

- 설계도서(관련도면, 설계설명서, 보고서 등)

- 조경시설계획

- 조경관리계획 수립

- 개략공사비 산출

- 수목식재 패턴 및 수종, 규격, 수량산정

- 하부구조계획

라. 기계설비분야

- 설계도서(관련도면, 설계설명서, 보고서 등)

- 개략공사비 산정

- 에너지절약형으로 계획 설계

마. 전기분야

- 설계도서(관련도면, 설계설명서, 보고서 등)

- 개략공사비 산출

- 수전설비 용량 내역서(단선, 복선, 결선도)

- 예정부하 용량 내역서

- 전등 배치도 및 구내 보안등 배치도

바. 통신분야

- 설계도서(관련도면, 설계설명서, 보고서 등)

- 개략공사비 산출

- 전화, 방송, TV공시청(CATV)설비

- CCTV설비

- 각층 통신설비의 구내 배치도

사. 소방분야

- 설계도서(관련도면, 설계설명서, 보고서 등)

- 개략공사비 산출

- 층별 소방설비(감지기, 경보기, 수신기, 발신기) 위치 등

- 방재설비의 산출서

아. 기타분야

- 건축물에너지효율등급 예비인증(1++등급), 제로에너지건축물인증 및 녹색건축물인증 에너지절약계획서 작성․제출

- 장애물 없는 생활환경 예비인증(일반)

- 조감도(3점)

4. 관계법규 조사 및 준용

가. 건축협의, 심의, 승인 관계법규

나. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

다. 도시계획시설 관련 법규

라. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙

마. 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

바. 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙

사. 건설공사 관련법규

아. 소방기본법 및 소방관련 제반법규

자.전기공사업법, 전기사업법, 전력기술관리법

차. 한전공급약관 및 내외선 규정

카. 하수도법, 환경부 제정 설계기준

타. 오수분뇨 및 축산폐수에 관한 제반 법규

파. 위험물 취급 관련 법규

하. 도시가스 사업법 및 동법 시행령

거. 주차장법 및 주차장 관련 제반법규

너. 에너지이용합리화법 및 동 시행령, 동 시행규칙

더. 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지 건축물 인증, 녹색건축물 인증에 관한 규칙

러. 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 및 관련 제반법규

머. 내진설계기준 관련법규

버. 한국산업규격

서. 국토교통부 제정 각종 표준시방서 및 설계기준

어. 범죄예방 건축기준, 유니버설디자인 통합 가이드라인

저. 발주자가 제시하는 관련자료 및 건설공사 설계지침서

처. 기타 관련되는 법규 및 국내․외 전문서적 및 기준

5. 검토 내용

가. 계약자는 설계 시 득하여야 할 각종 심의 및 협의에 적합하도록 설계에 반영하여야 한다.

나. 설계의 합리성, 구조물의 안정성, 기기의 안전성 및 설치시설의 적정성 등에 관한 기본사항을 조사․검토하고 결정한다.

다. 공종별 계획을 근거로 실시설계 작업 이전에 공종별로 세부설계 기준안을 작성한다.

라. 설계에 임하기 전에 사용될 공법에 대하여는 발주자와 충분히 검토한 후 결정하여야 한다.

마. 계획 및 중간설계는 발주자 및 감독관, 외부 자문의원 등의 의견을 적극 반영하고, 지반조사 등 각종조사를 실시하여 그 결과를 반영하여야 한다.

바. 동 건물이 최적의 기능을 발휘할 수 있도록 유사시설에 대한 조사를 실시하여 반영하여야 한

6. 개략 공사비 산정

가. 공사비 개략 계산은 신빙성 있는 자료를 근거로 하여 실제 소요공사비의 근사치가 되어야 한다. 공사비 산출은 아래와 같은 규정에 정해져 있는 것은 그 규정에 따르고, 그렇지 못한 것은 관련 계산근거 및 자료를 함께 제출하여야 한다.

나. 공사비 계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가 계산에 의해 작성하여야 한다.

다. 공사비 적산은 표준품셈, 노임단가, 적산기준 및 시설공사 설계지침서, 발주기관의 실적공사비 등에 따라 산출한다.

라. 특수공정은 제조원가 계산서 양식에 따른 서식으로 2개소 이상의 견적서를 받아 합리적인 단가로 결정한다.

마. 제조원에 의할 수 없는 공정의 단가는 전문가의 견적단가로 결정한다.

7. 계획 및 중간 설계 도서 작성 : 제1종 단순 상급 적용

	2		실시설계

1. 작성기준

가. 실시설계는 중간설계를 바탕으로 도서를 구체화하여 공사 시행에 필요한 설계도서로 작성하는 것을 말하며, 국토교통부 고시 ｢공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준｣ 별표 2의 실시설계도서 내용에 준한 설계도서 등을 작성하는 것을 말한다.

나. 완료 전에 각종 인가, 심의, 인증 등 사전 행정절차가 이루어지도록 한다.

- 설계 설명서

- 일반 및 특별 시방서

- 설계도면, 설계내역서

(내역서, 일위대가표, 설계수량 산출근거, 단가산출근거, 각종 계산근거 등)

- 각종 계산서(구조계산서, 부하계산서 등)

- 공사예정공정표

- 실시설계 종료보고서

- 기타 발주자가 요구하는 사항

2. 검토내용

가. 중간설계에서 결정된 각종 시설의 형식 및 기준을 재검토하여 보고 후 최종 확정안에 대하여 세부 실시설계 도서를 작성한다.

- 각 분야별 관련 법규 및 규정, 기준에 적합할 것

- 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련기준 등

- 수급인은 과업내용을 숙지하여 본 과업내용이 적합하도록 하여야 하며, 성과품 납품 시 또는 그 후에라도 잘못된 사항이 발견되었을 때에 이를 숙지하지 않은 책임은 설계 용역자에게 있으며 즉시 보완 수정하여야 한다.

- 설계도서 작성은 발주기관에서 지정하는 규격으로 한다.

· 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명하며, 문자는 한글사용을 원칙으로 한다.

· 설계도서의 작성은 원고와 원도를 작성하여 감독원의 검사를 받은 후 인쇄하여야 한다.

· 주요자재는 KS 표시품을 사용하고 KS 표시품이 없을 때는 감독원의 별도 지시에 따라 설계한다.

· 설계도면은 범례, 도면 목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 용량, 기타 사항을 표기한 일람표를 표기하여야 한다.

· 기타분야 : 건축물에너지효율등급 예비인증(1등급++), 장애물없는 생활환경 예비인증(일반), 녹색건축물 인증

- 각 설계도는 더 이상 세부설계가 없이 시공될 수 있도록 최대한 상세히 표현되도록 하고 더 이상 실내장식이 필요하지 않도록 완벽하게 설계한다.

- 각 설계도는 관련법률을 참조하여 구분 설계하여야 한다.

3. 분야별 설계요령

가. 건축분야

- 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2의 도서작성의 구분에서 상급을 적용한다.

- 건축법 및 건설관계 법령 기준

- 건설산업기본법 및 건설 관계 법령 기준

- 내진설계기준 관련 법규

- 건축물 에너지효율등급인증 및 제로에너지 건축물 인증에 관한 규칙

- 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙

- 기타 본 과업에 적용되어야 할 관련 기준 등

나. 토목분야

- 구조물의 설치위치의 지질, 지장물 재조사 결과를 기초로 하여 안전하고 경제적이며 미관에 좋은 구조물을 설계한다.

- 구조물은 국토교통부의 제반 설계기준 및 시방서에 따라 설계한다.

- 포장설계는 토질, 기후, 골재 및 교통량 등에 관한 조사서 결과의 기초 자료에 따라 설계한다.

- 포장 구조는 콘크리트와 아스팔트 포장의 경제성, 시공성, 수명, 유지관리 등을 비교 검토하여 설계하여야 하며, 설계 근거에 따라 포장 두께를 결정해야 한다.

- 본 과업시행에 필요한 시설물의 형식, 토질조사, 부대시설의 위치선정, 구조물 설치 및 인․허가 등 설계를 위한 현장조사 및 유관기관과의 협의를 위하여 수급인은 발주기관에 최대한 업무협조를 해야 한다.

- 과업의 신뢰성이 필요하고 전산처리가 가능한 부분의 업무는 전산처리를 원칙으로 하고 고도의 기술용역업체와 공동으로 과업을 수행할 수 있다.

- 관로공법 검토 시 지반조사의 결과에 따라 굴착공법, 가시설공법, 기초공법 및 구조검토가 되어야 하며 교통량 및 지하매설물이 많은 지역에 대하여는 적정한 신공법을 검토한다.

- 관거 매설 시 기존 도로 굴착 및 복구계획을 면밀히 수립하여 도로 굴착으로 인한 보행자의 안전한 통행과 차량소통에 지장이 최소화되도록 대책을 수립하여야 하며, 도로(교통)시설물 설치 및 유지관리에 지장이 없도록 설계하여야 한다.

- 관로의 노선계획은 기존 건물이나 시설물에 영향을 미치지 않도록 계획하여야 하며, 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

- 하수관로는 지하매설물 등을 고려, 시공에 장애가 없도록 하고 자연유하를 원칙으로 하며 불가피한 지역은 압송하도록 계획하고 수리학적 및 유지관리에 지장이 없도록 면밀히 검토한다.

- 관종은 경제성, 시공성, 내구성 등에 대해 국내외 사례를 종합적으로 비교 분석하여 결정하여야 한다.

다. 조경분야

- 조경공사 실시설계도면은 조경 설계기준, 조경공사 설계지침서, 진주시 건축조례 등 관계법규 및 제반규정을 준수하여 작성하여야 하고, 건축․기계․전기 등 본 조경공사 설계와 관련되는 모든 사항을 면밀히 검토한 후 실시설계 하여야 하며, 관련 공종간의 시공한계는 명확하게 구분하여야 한다.

- 공사비 내역서에는 식재공사, 포장공사, 토공사, 구조물공사, 기타 등으로 나누어 작성한다.

- 세부 공종별로 일위대가표 기타 필요한 산출근거와 단가의 적용근거를 명확하고 간결하게 작성하여야 한다.

- 건축법 및 국토교통부 고시(조경기준)등 식재 관련법령에 적합하여야 한다.

- 주위환경과 어울릴 수 있는 경관이 조성될 수 있으며, 공해에 강하고 사계절 볼거리를 제공할 수 있는 식재수종을 선정하며, 식재(교목) 수량은 법정수량 이상을 식재하여야 한다.

- 부지 내 식물생육에 적합한 표토를 채집하여 식재공사의 기반조성의 설계에 반영하여야 한다.

- 식재 부대시설

· 지주목은 수목의 규격에 따라 적정한 규격을 선택하고 미관을 고려한 재질로 설치한다.

· 수목 표찰은 단지 내 주요지점 및 주민의 보행량이 많은 곳에 수종별로 수목에 설치한다.

- 이용자의 동선 및 시설물간의 효율성을 고려하여 일체화된 설계를 유도하여야 한다.

- 종합정보안내판은 각종 안내시설물을 통합한 종합설계가 되도록 하여야

- 회단이 조성되는 경계 구간은 조경석 등으로 설치가 되어야 하며 필요한 구간에는 화강석 경계석 또는 이와 유사한 시설로 설치하여 집중호우 시 토사 유실이 없도록 하며, 수목 생육에 지장이 없도록 설계한다.

라. 기계설비분야

- 제반 관련 법규 등의 기준에 적합할 것

- 주요 설비는 각각의 시방제시 및 장단점을 기술

- 전체 설비의 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항

- 경제성 분석 및 최적방식 선정사유(객관적인 자료 제시)

- 견적 처리분은 견적서 2부 이상씩 반드시 첨부

- 기타 필요한 사항

- 다음 소요설비에 대하여 검토 설계한다.

1) 공기조화 설비

· 각 실의 환기설비를 검토하여 에너지 절약형과 자동제어 기기의 선정

· 자연환기시스템 검토 및 열회수 기능을 가진 기계환기 시스템, 주방 등의 환기설비 반영

· 자연냉방 효과를 높이기 위한 자연풍의 효과적인 유입방법 검토 설계

· 공조설비의 소음저감기술 검토 설계

2) 냉난방 설비

· 부식에 의한 배관재질 및 응축수에 대한 검토설계 (에너지절약 방안으로 활용)

· 보수유지를 쉽게 하기 위한 시스템과 구성요소를 검토 설계

· 프레온 가스등 오존층 파괴에 대하여 충분히 검토 설계

· 사용연료의 저장시설 및 폐열에 대한 회수장치에 대해 검토 설계

· 고효율 시스템 장비 검토 설계

· 배관의 단열성을 높이고 기밀하게 하여 에너지 절감 설계

· 냉방부하와 난방부하가 동시에 발생하는 경우 분산공조시스템 검토 설계

3) 위생설비

· 급수공급 방식에서 수압 및 각 실별 관말수압에 대한 충분한 검토(수두손실)와 오․배수설비 검토(배수구와 연결문제) 설계

· 세면기 및 소변기 전자감응식(전기식), 절수형기기, 핸드타올기, 장애편의시설 등 검토 설계

· 기계실 배수시설 검토 설계 (배수구와 연결 문제)

· 생활하수 순환활용 검토 설계

4) 소방 설비

· 화재발생시 피해를 최소화할 수 있도록 검토 설계

· 방재설비(전기, 통신)와 관련된 소화설비의 적정여부(소방법상 방화구역 적용 시 문제점 등) 검토설계(반드시 관할 소방기관 사전협의 및 소방기술사의 검토의견서 첨부 제출)

5) 방음․방진 및 내진설비

· 각 설비의 방음․방진 및 내진에 대한 대책, 소음저감기술 검토 설계

6) 승강설비

· 운전방식 및 대수, 용량, 속도제어, 인버터 등 검토 설계

7) 방재분야

· 기계설비 중 소방시설과 관련한 방재설비 검토 설계

8) 친환경적 기계설비요소 검토하여 설계한다.

· 냉각탑 사용시 발생하는 레지오넬라균

· 소음, 진동, 환기, 습도

· 열 쾌적과 과열

· 물순환 체계 확립하여 물의 생태적 정화방법

9) 에너지 절약계획 설계

· 적은 에너지 운용 고려

· 고효율 기자재 설비 채택

· 생애비용, 환경부하 최소화, 경제성 검토

10) 오수정화 설비

· 오수량, 수질, 처리방식 결정의 적정 여부 검토 설계

마. 전기분야

- 수배전 설비

· 용도에 적합한 케이블 및 차단기 설계(수전설비용량, 전압수전방식, 수변전실 면적, 위치, 배전전압방식)

· 수배전 부하계통 경로 설계

· 접지 설비

· 비상전원 용량, 위치 설계 및 2회선 수전 예비전원방식 검토 설계

· 무인운영이 가능한 시스템 설계

- 동력 및 조명의 전력 간선설비

· 경로 배선 포설시 전선관을 이용 허용전류 감소계수를 적용 전선굵기 선정

· 사용전선의 허용전류 및 전압강하 계산에 의한 선종규격, 접지선 결정

· 전선과 전선관은 설비증가 대비 여유가 있게 설계

· 공사 시 동력전선의 식별이 가능하도록 표기 설계

- 동력전원 및 부하설비

· 전등 동력 분전반은 각 실별로 설계

· 각층별 면적에 맞게 비상 콘센트 수량 및 분기 회로수 설계

· 설비부하 내용을 충분히 숙지하여 용량에 맞게 설계

· 환기설비 부하 및 기타 전원설비 일체

· 동력 전력간선 설비

· 전력선 포설방식 및 옥내관로 구분 등

· 사용 전선류의 허용전류 및 전압강하 계산에 의한 선종 규격, 접지선 결정

· 동력 제어반은 각 부하 유니트별 인출형으로 각 기계실별로 설계

· 자동, 수동조작이 가능하고 기계설비 자동시스템 상호연동이 가능하도록 설계

· 설비부하 내용을 충분히 숙지하여 이에 맞게 설계(차단기, 전자개폐기 등)

· 냉난방, 공조, 환기, 급․배수, 오수정화 등 설비부하 및 기타 전원설비 일체

· 기타 전원공급이 요구되는 시설물 전원검토 설계

- 조명 설비

· 적정조도 계산에 의한 각 실별 등수, 등종 결정 및 실별 내용물과 간격 유지

· 각 층별, 분기회로별 총 부하용량 계산(최대한 자연광을 이용하여 설계)

· 규정 조도 및 지점별 조도 분포(균등) 설계

· 에너지절감 및 유지관리 편의를 위한 합리적 조명제어 방식 검토 설계

· 적당한 밝기 및 연색성이 우수한 조명 설계

· 빛의 양적, 질적 변화가 작은 조명방식 검토

· 분석공간 각 실별 적정 조명설비 검토

· 본 과업의 건물 특성에 알맞은 조명종류 및 설비 설계

· 주차장 등에는 가로등 및 보안등을 설계하고 미관을 고려한 등종 선정 및 자동 또는 수동 점멸이 가능하도록 설계

- 예비전원

· 비상 발전기 용량은 전체 부하설비 용량에 대하여 정전 시 필요 전원 공급 장소에 따라 용량 선정 사례를 토대로 검토 선정

· 비상발전기 기동 방법에 대한 검토

· 2회선 수전 예비 전원방식 검토

- 피뢰 및 접지설비

· 건축물 전체를 보호할 수 있는 설비

· 접지개소 및 접지종별, 층별 접지 설비 검토

- 방재분야(자동화재 탐지 설비)

· 배선은 전기설비 기술기준 및 소방설비 기술기준에 관한 규칙에 의하여 설계

· 제어실에서 층별 감시를 할 수 있도록 설계

· 감지기 취부 높이 종류 및 수량은 용도와 면적에 적정하게 설계

· 각 층별 발신기 음향장치 설치는 법적 수용거리 이내에 두도록 하고 소화전과 연동되도록 한다.

· 경계구역 및 구역 일람표 작성

· 비상방송 설비는 자동화재 탐지설비의 감지기와 연동하여 설계

- 유도등 설비

· 소방대상물 및 장소별 피난유도등 표지와 통로 유도등 표지 설계

- 설비분야 시설물 관련 전기 설계

· 용도에 맞게 검토하여 설계하되 건축 수급인과 필히 협의하여야 한다.

- 전력 조명 제어설비

· 최신 설비 및 장비로 설계

- 기타 사항

· 본 공사는 전기공사업법 및 관계법령, 법규, 규정에 위반됨이 없이 설계

· 실시설계의 내용 및 작성기준에 의한 설명서, 보고서 내용 검토

·전기, 통신, 방재용 전원 및 접지설비 일체

· 각종 기기 선정의 장․단점 대비 검토 설계

· 전력선과 통신선의 충분한 이격거리 유지(유도장애 방지)

· 건축반영 요구조건을 조사 반영하고, 국내외의 유사한 사례를 조사 분석하여 반영될 수 있도록 검토

· 전기관련법 및 소방법 등 제반 법규를 충분히 검토하여 위반됨이 없이 적용

· 모든 전기 기계기구는 에너지 절약형 사용

· 수변전설비, 부하설비, 조명 등의 자동제어시스템을 도입하여 사고시 신속대처

바. 통신분야

- 장비별 부하계산 수치에 의한 각 시스템별 단독전원 및 비상전원 확보 검토 설계

- 각종 기기 선정 시 장․단점 비교검토 설계

- 각종 통신설비 규정에 의한 접지 저항치 확보하도록 접지설비 검토 설계

- 각 설비는 발주자의 요구 및 경제성, 안전성을 감안하여 설계하되 외관이 미려하고 기술수준에 적합하게 검토 설계

- 통합제어시스템 검토 설계

- 기타 소방법에서 정하는 설비 검토 설계

1) 통합배선설비

· 체계적인 통합배선시스템 구축

· IDF, FDF 등 통신기반시설 용량 및 설치위치 선정(향후 증축 등 대비 적정예비용량 확보)

· 각 실별 면적 및 용도에 적합한 회선수 및 아울렛 수량 선정

· 아울렛박스는 정보통신․전기 통합 시스템박스 검토, 인출구는 3구 이상 검토

· 전기 등 타시설과 이격거리 준수

· 구내 정보통신회선은 광케이블 또는 UTP cat6 이상 케이블 사용

2) 전화교환설비

· 옥내․외 회선수 및 향후 증설을 대비한 시스템 설계

· 사무실 면적 및 용도에 맞게 적합한 전자교환기 산정 및 카드 회선수 설계

· 정보통신센터 공간확보 및 MDF, IDF, 국선단자반 등 각층마다 설치위치 선정 및 용량산출

· 인입 및 각 단자반과 단자반간의 예비 배관․배선 설계

· 사무실 면적 및 용도에 맞게 전화선로 구성

· 전자교환기 소요 용량 및 예비회선을 고려하여 설계

· 옥외간선 구성

3) 정보통신 네트워크(LAN) 설비

· 종합정보시스템 운용을 위한 네트워크망 구성도 설계

· 정보통신네트워크 시설장비 선정 및 데이터 MDF, IDF 등 정보통신 설비 분배반 위치 선정 설계

· 상주인원 및 용도에 적합한 LAN설비 구성

4) TV 공시청 및 CATV 설비

· TV 공시청 전계강도 측정치에 의한 TV 수신설비 설계

· 증폭기의 성능을 고려, 수신자를 최대한 수용할 수 있도록 설치 위치를 선정하여 설계

· 유휴분배 및 분기단자는 사용하는 선로에 영향을 미치지 않도록 75Ω으로 종단하도록 설계

· 케이블 및 기기의 경년 변화에 대비, 구내증폭기의 최대 이득을 감안하여 설계

· 종합유선방송 구내전송설비 규정에 의한 CATV(HEAD END)시스템 적정 여부 고려 후 반영

5) A/V(방송, 영상)설비

· ATTENUATOR는 OFF상태에서도 비상방송을 청취할 수 있도록 스피커 선로 외에 비상선로 1선이 추가되도록 설계

· 전관방송(비상방송) 설비는 앰프출력이 스피커출력의 약 30%정도 예비출력을 확보하도록 설계

· 수직, 수평배선 규격 검토 설계

· 각 설비는 사용장소에 따라 실내용적과 음의 잔향시간을 검토 설계

· 설비 설치목적별, 장소별을 검토 적정한 시스템이 구축되도록 검토 설계

· RACK 크기는 추후 설비증설을 감안하여 산출

· 영상설비는 실의 규모 및 사용목적 등을 고려하여 최적의 시스템으로 설계

(소장실, 중회의실의 경우 스크린모니터 설치 설계)

6) CCTV 설비

· 전원선은 각 동별, 층별, 구역별로 구성 설계

· 제어선, 전원선, 영상케이블 등 규격 검토 설계

· CCTV 단독제어 및 무인센서 자동제어 검토 설계

· 사각지대가 발생하지 않도록 카메라 대수 선정 검토 설계

· 적정 수량의 모니터와 녹화장비 설계 반영

· 추후 설비확장 검토 설계

7) 위 사항 중 분석․실험실 용도와 부적합한 시스템은 설계반영에서 제외해야 하며, 정보통신 시스템 운영 및 관련 법규 상 필요하다고 판단되는 부분은 사전 협의하여 반드시 반영할 수 있도록 설계

사. 소방분야

- 자동화재 탐지설비 검토 설계

- 화재수신반 규격 방식 등에 대한 검토 보고

- 감지기의 위치, 종류, 설치면적에 대한 검토 설계

- 기계분야의 소방시설 자료 검토 후 연계하여 설계

- 소방법 및 소방 관련 각종 규정에 적합하게 설계

4. 실시설계 도서작성 : 제1종 단순 상급 적용

	3		기타 설계도서

1. 설계설명서

가. 건축 분야

- 설계설명서는 본 과업의 전체 순위를 정하여 아래와 같이 알아보기 쉽게 하여야 한다.(개요, 구조 및 면적, 부대시설, 기타 필요한 사항)

- 설계설명서에는 설계조건 적용 등 설계 특수사항을 표기하여야 한다.

- 각 시설별로 설명서는 건축분야 이외의 사항(좌석배치도, 붙박이 가구 등)도 표기되도록 하여 전체적으로 설명되어야 한다.

- 세부시설 설명서는 각각 시설별로 한 장 단위로 시설개요, 면적, 규모, 층고, 일반 시설내용, 특수시설내용 등 전반에 걸쳐 기술하고 그 실의 기능, 용도, 설치 목적 등을 표기하여 실제 사용자에게 시설물 이용에 편리하도록 기준이 되는 근거와 안내가 되도록 작성한다.

- 기타 세부도면 작성 및 분류는 발주자의 지시에 의한다.

나. 토목 분야

- 부지정지 및 토목공사, 상․하수도 시설설계, 포장 및 우․배수․부대시설 설계

다. 조경 분야

- 조경설계 개요, 식재 및 시설물에 대한 일반 및 특수설계내용

- 토공설계

· 부지 조성을 위한 토량의 이동은 각 용도 지구간의 검토 및 성토간의 이용량이 비슷하도록 계획하고, 가능한 사토가 발생하지 않도록 계획하며, 수목 식재지역은 객토(양토)를 하여야 한다.

- 배수시설물의 설계

· 배수시설의 설계는 부지의 토공 및 시설물과 연관하여 필요한 개소에는 배수시설을 설치하도록 한다.

- 상수시설 설계

· 수목의 관수에 필요한 상수시설을 설계한다.

- 하수시설 설계

· 건물 및 수목의 하수처리, 화단 배수시설을 설계한다.

- 지하 구조물이 있는 곳에 녹지공간을 조성할 경우에는 수목이 성장할 수 있는 충분한 토심을 확보하여야 하며, 배수시설이 되어야 한다.

라. 기계설비분야

- 설비개요

- 계통 및 방식선정 등

- 당해 용역의 특수성 및 단일품목 채택사유 등

- 유지 관리상의 장․단점 및 에너지 절감 비교안 등

- 공사개요 : 위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등

- 주요설비 : 설비시방, 배치계획, 설비용량, 설비사양 등

- 주요 유틸리티 설비

· 전력, 물, 냉동, 펌프, 공기정화, 증기, 압축공기, 배선, 배관, 기타 설비

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 사항

- 세부시공계획

- 세부공정계획

- 유사시설 설비현황 등

- 기타 필요한 사항

마. 전기․정보통신 분야

- 각 분야별 설비개요

- 계통 및 방식선정 등

- 당해 용역의 특수성 특수공법 특수규격 채택사유 등

- 유지관리의 편의 및 에너지 절감 비교 안 등

바. 소방 분야

- 설비개요, 계통 및 방식선정 등 소방설비에 대한 설명

2. 공사 시방서

가. 일반 시방서

- 건설공사 표준시방서에 기준하여 각 공종별로 상세하게 기술하여야 한다.

나. 특별 시방서

- 특수공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 일반 시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 작성하며 아래 사항을 빠짐없이 기술하여야 한다.

· 건설공사 표준시방서에 표시되지 않은 제반 공종에 대하여 기술하여야 한다.

· 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법

· 주요 자재에 대한 사항(특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)

· 품질관리 시험기준과 방법 및 회수 등

· 기타 주의를 요하는 사항 등

다. 관급자재 시방서

- 발주자와 협의하여 선정된 자재에 대하여 기술한다.

3. 설계도면

가. 공통분야

- 설계도면은 A3 크기로 설계함을 원칙으로 한다.

- 건축설계의 도서는 KSA 0005 제도통칙에 준하여 작성한다.

- 과업 시설물의 설계도서는 기관별, 공종별, 발주 구분별로 편철하여 도서 목차, 위치평면도, 배치도, 구적도, 평면도, 단면도 등의 순서로 작성한다.

- 도면 제작 중 중복이 있을 시는 단일화할 수 있으며 동일 도면에 표시 할 수 있다.

- 도면 규격과 설계도 축적이 맞지 않을 경우에는 일부수칙을 변경할 수 있다.

- 축적은 도면의 축소와 확대에 대응할 수 있도록 스케일자를 사용하도록 한다.

나. 건축분야

- 건축법 등에서 규정하는 도면

- 건설공사 설계지침서에 의한 각종 도서

- 건축 각 공종별 부분 상세도

- 기타 공사 시행에 필요한 도면(발주기관에서 구분 발주가 예상되는 공종은 별도 작성 요함)

다. 토목분야

- 평면도와 종단면도는 동일 평면상에, 평면도는 상단에 종단면도는 하단에 작성한다.

- 평면도

· 축척은 1:500이하로 하고 등고선은 1m 간격으로 표시하되 곡선부에 곡선표를 도면에 표시하고, 가수준점의 위치 및 골조 측량에 따른 좌표(X.Y)도 동시에 표시하여야 한다.

- 종단면도

· 축척은 횡 1:500이하로 종 1:200으로 하고, 평면 곡선 및 종단 곡선표를 표시하되 구조물의 규모 위치 및 기존현황을 상세히 표시하고, 가수준점의 표고를 표시하여야 한다.

- 횡단면도

· 축척은 1:100이하로 하고 중간측점(변화지점 포함) 및 구조물의 시종점의 횡단을 필히 포함 시켜야 하며, 기존 현황 및 설치코자 하는 구조물을 상세히 나타내고, 부지 가로․세로 세부적인 횡단도를 작성하여야 한다.

- 구조물도

· 구조물의 도면은 시공의 순서대로 각 부위별로 필요한 축척으로 세분하여야 한다.

- 기타사항

· 기타 설계도에 수록되어야 한다고 인정되는 사항에 대하여 발주자와 협의하여 작성한다.

라. 조경분야

- 안내도

· 공사 시공현장을 지도와 같은 형태로 그린 것으로 기계의 운반계획 도로의 상황거리 등을    알 수 있도록 한다.

- 위치도

· 공사 시공현장을 범위와 주변과의 관계를 나타내는 것으로 경계의 확인, 인접지의 상황, 가설관계 등을 알 수 있도록 한다.

- 전체 계획 평면도

· 개발의 전모를 나타내는 도면으로 모든 일에 있어서 이 도면이 중심으로 되고 적산을 하는 데 중요한 도면이다. 시공의 범위 인접 부분과의 가설계획과 작업 공정계획 구역마다 공사 배분 이외에 적산을 하는데 점검용 도면으로 사용할 수 있도록 한다.

- 일반 평면도

· 시공 구역의 전체를 나타낸 도면으로 이것에 의해서 시설이나 설비 등을 알 수 있고 전체계획 평면도의 2～3배 크기로 한다. 규모의 크기에 따라 다르나 공사의 상호 관계를 자세히 알 수 있는 것으로 적산을 하는데 도움이 되도록 한다.

- 시설 배치도

· 부지 내의 시설을 도시한 것으로 휴게, 유희, 운동, 수경, 교화, 편의, 관리시설 등의 시설 위치와 치수가 기입된 도면이다. 이 도면으로는 시설의 수나 양을 확인할 수 있도록 해야 한다.

- 조성도

· 부지의 조성을 행하고 절토나 성토의 현황을 나타낸 도면으로 조성평면도, 종단면도 토량도 등을 함께 말하는 도면이다. 여기에 옹벽, 돌쌓기, 배수 등의 위치나 연장을 기입해 놓은 것으로서, 부지 조성상의 적산은 이 도면에 의해 모두 알 수 있게 한다.

- 시설도

· 시설을 구체적인 형태(평면, 입면, 단면, 상세도, 정면, 측면)로 나타낸 것으로 매우 세밀하게 해야 하며 단체를 수량계산할 수 있는 단위로 되어 있어야 한다.

- 조경 수목 식재도

· 식재는 큰 수목의 반입가능 여부에 따라 적산의 기준이 달라지므로 식재시기, 장소, 굴취, 운반, 식재가 연관성을 가져야 하며 발주자의 지정목으로 선정한다.

- 식재 상세도

· 각 수종별(교목, 관목, 지피식물, 인공지반 식재 종류별) 식재기반, 지주목 등을 명시

- 급배수 설비도

· 명거배수(표면배수)와 암거배수를 정확하게 작성해야 하며, 도면이나 시방서에 세밀한 부분까지 기입하여야 한다.

- 포장 계획도

· 사업대상지내 포장 부분에 개한 계획으로 유기적 연결이 가능하도록 포장계획을 수립하여야 하며 초장재의 규격, 방법 등 세부적인 단면도를 포함하여야 한다.

- 조경구적도 1/600이하

- 지하물 설치도 1/600이하

- 각 설계도의 내용의 이해가 용이한 최적의 축적으로 작성하여야 하며, 필요시 발주자와 협의하여 작성한다.

마. 기계설비분야

- 일반사항

· 범례, 도면목록, 기계기구 일람표(수량, 용량, 사양, 기타 사양 포함)

- 배치도

· 기본설계 시 표기된 사항을 구체화한 내용

- 계통도

· 주요 기계장비 및 유틸리티설비의 자동제어시스템, 공기조화, 급․배수(급탕 포함), 소방, 기타 설비의 세부 계통도

- 평면도

· 각종 설비 평면도, 기계실 확대 평면도, 기계설비 및 주요설비 확대 평면도

- 배관도 : 기계실 입체 배관도

- 단면도 : 기계실 및 각층에 대한 단면도

- 옥외 공동구 : 옥외 공동구 관리 및 각종 설비 평면도, 단면도(확대도면 포함)

- 각종 설비별 상세도

- 기  타

· 자동제어 설비구성도, 그래픽 보드 및 패널 상세도, 장비별 기초도, 기계장비 상세도, 부대시설 상세도

바. 전기/통신 분야

- 범례, 도면 목록을 작성하고 도면의 일부분에 품명, 용량, 기타사항을 표기한 일람표를 표기하여야 하며, 도면의 내용은 다음과 같다.

· 배치도 : 기본설계 표시된 사항 구체화된 내용

· 계통도 : 각 설비별 세부 계통도

· 평면도 : 각 설비 평면도, 기구 및 주요설비 확대 평면도

· 단면도

· 배관 및 배선도

· 기계 기구 및 설치 상세도

· 블록 다이아그램

· 기타 : 자동제어 설비 구성도, 그래픽 보드 및 판넬 상세도, 장비별 기초도, 계장 장비상세도, 부대시설 상세도

사. 소방 분야

- 배치도, 계통도, 평면도 등

4. 각종 계산서 등

가. 공통사항

- 본 과업에 관련된 구조 계산서 등 각 분야의 기술적 계산서는 건축법 등 관련 규정에서 정한 내용에 따라 관련 전문가가 작성하고, 반드시 작성자가 날인하여야 한다.

나. 건축, 토목 분야

- 수리, 배수시설, 구조(안전), 기타 계산서

다. 기계설비, 소방분야

- 기계설비 용량 및 부하, 가스 부하, 소화설비, 기타 계산서

라. 전기분야

- 적용공식, 계수 채택근거

- 각종 기기의 용량 계산서(변압기, 차단기, 수배전반, 동력반, 조명분전반, 발전기, 축전지, 교환기 등)

- 조도, 전선로 전압 강하, 기타 계산서

마. 신․재생 에너지설비(해당 시)

- 설계 설명서

· 신․재셍에너지 시스템 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자 유지관리비와의 세부비교 검토내용 등

- 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 필요시 견적서 등

5. 설계내역서

가. 공사비 원가계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가 계산방식에 따라 작성한다.

나. 설계내역서는 표준품셈에 의한 방식과 실적공사비 적산에 의한 방식 모두에 대해 작성한다.

다. 설계내역서는 각 분야별로 구분 작성한다.(발주자와 별도 협의)

라. 공사비 적산은 정부표준품셈, 통계작성 승인기관의 시중노임단가, 시설공사 설계지침서 등에 따라 산출하되 아래와 같이 사전조사 및 판단을 하여 적산하여야 한다.

- 재료단가 조사

· 본 공사에 소요되는 모든 자재를 각 폼목, 품질 및 규격별로 조사하고, 단위조사는 일반 시중자재 및 공장공급이 가능한 것을 기준으로 한다.

· 단가는 조달청에서 고시하는 자료를 우선 적용하고, 이에 누락된 품목은 일반 시장조사를 하되 공신력이 가장 뛰어나다고 판단되는 시중 물가자료 책자 3종류 이상 비교하여 채택된 것과 직접 시장 조사된 3개 이상의 견적서 등에 의한다.

· 공사자재 및 자재단가 결정은 거래 실례가격에 기준 한다. 단, 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

· 사용자재는 국내 생산품 중 ㉿품 및 최고품 사용을 원칙으로 한다. 단, 국내에 생산이 되지 않는 자재의 경우에는 사용계획, 사용처 및 사유를 명확히 밝히고 이와 대체할 수 있는 국내 제품과 비교 검토하여 발주자와 협의하여 적용한다.

- 수량산출

· 수량산출은 정부표준품셈 규정에 따라 산출하되 기준에 명시되지 않은 사항은 당해 공사의 목적에 부합하도록 감독원과 협의 결정하여 적용한다.

· 공사규모, 내용, 공기 및 현장조건 등을 비교하고, 기계장비의 선택적 조합의 합리성과 경제성을 비교 채택하여 적정 산정한다.

· 사용단위는 C.G.S단위를 주로 사용하되 소수점 이하 2자리까지 하고 끝수는 반올림한다.

· 수량산출조서는 공종별, 품목별로 알아보기 쉽게 작성하고, 공사시에 가감 및 정산이 가능하도록 산출 단위별로 표기한다.

· 위의 모든 수량산출에 관한 것은 착오 또는 오차가 없도록 하여야 한다.

- 주요자재

· 주요자재 구입에 따른 시방서를 작성하고 그 자재의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

· KS품에 없는 제품 사용할 때 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방서(외국규격)등을 검토하여 사용하도록 한다.

· 주요자재는 회계예규 “시설공사 계약일반조건” 에 따라 운용 관리하는데 지장이 없도록 하고, 설계도서를 작성하여야 한다.

· 발주자가 공급한 수급인료와 기타 사항은 설계용역 수행을 위하여만 사용하고 잉여분은 발주자의 지시에 따라 반납하여야 한다.

· 발주자의 사정으로 수급의 원활을 위한 사전 물량 파악이 있을 시 즉시 산출하여야 한다.

- 관급자재 대상 업체 및 품목 선정 방법(수의계약 대상)

· 중소기업청장이 고시한 물품 중 관급자재로 선정함이 타당(하자관계가 분명하고, 타공정과 마찰이 없고, 관리용이)한 품목 중

· 우수제품, 성능인증제품, 신기술인증제품

· 특정업체의 연속 지정 배제를 위해, 균등배분의 원칙 준수

· 해당시설물에 적합한 제품, 기 배정현황, 설치 후 관리를 위한 해당지역 생산제품 등을 고려

· 사업별 특수성과 현장여건에 따른 용도, 품질, 가격 및 크기 등 제반사항 감안

- 관급자재 대상 업체 및 품목 선정 방법(일반경쟁 대상)

· 수의계약 대상 품목 외에 당해 공사의 주요 자재로서, 관급이 필요하다고 판단되는 품목(수요기관 요청 포함)

· 설계도서에 특정규격 지정가능 물품

· 중소기업청장이 고시한 공사용 분리발주(관급)자재 물품이 아닌 조달청 우수제품이 당해 공사에 필요한 품목

6. 공정표

가. 본 과업의 공사 공정표는 공사기간 및 공사의 내용 파악되도록 공사기간별 세부 공종이 상세히 나타나도록 네트워크식 공정표(Overlapping 적용)를 작성하여 제출한다.

나. 특별시방서에 명시되어진 공종 중 발주자가 지정하는 주요 공정은 별도로 공정표를 작성한다.

7. 완료보고서

가. 본 종합보고서는 기본설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐 논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고, 구조물의 특성과 용도의 개념을 명확하게 기술해야 하며, 관리운영에 관한 사항과 각실 면적 및 기능과 시설개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모해야 한다.

나. 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합보고서이어야 되며, 다음 사항을 상세히 수록하여야 한다.

- 과업의 목적, 과업의 범위, 과업의 내용, 사전조사 내용 요약, 설계기준, 구조물 설계안별 검토 내용, 세부 설계내용(공종별 비교 검토내역 포함), 주요자재 및 수급계획, 시공계획, 부도(지도 또는 도표) 첨부, 참고자료, 기타 발주자의 요구사항

제5장		설계도서 납품목록

	1		일반사항

1. 수급인은 본 과업지시서 및 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」등 관련법령 및 규정에 준하여 성과품을 작성 제출하여야 한다.

2. 모든 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시한다.

3. 최종성과품 작성 시 분리발주 대상은 분리발주가 가능하도록 도서를 작성하여 성과품의 납품일정에 따라 제출하여야 한다.

	2		계획설계 납품도서

종 류		내 용	규격	수량	단위
건축	법규검토	제반법규검토, 인허가절차 파악	A4	3	부
		설계구상안	A3	3	부
	건축계획서	설계개요	A3	3	부
		배치계획	A3	3	부
		평면계획	A3	3	부
		입면계획	A3	3	부
		단면계획	A3	3	부
	모형	Sketch 또는 Study Model	-	1	식
	건축 도면	배치도	A3	3	부
		대지 종․횡단면도	A3	3	부
		각층 평면도	A3	3	부
		입면도(2면 이상)	A3	3	부
		단면도(종․횡단면도)	A3	3	부
	심의도서	필요시
구조	구조계획서	구조계획개요	A4	3	부
	심의도서	필요시
기계	기계설비계획서	기계설비 계획개요	A3	3	부
	심의도서	필요시
전기	전기설비계획서	해당 법규 검토	A4	3	부
		설계방향 설정, 전기설비계획개요	A3	3	부
조경	조경계획서	식재 계획도	A3	3	부
	심의도서	필요시
방재	심의도서	법규체크리스트 및 소방개략계획서	A3	3	부
측량	성 과 도	현황측량 성과도		1	부

* 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

** 위 제출목록은 분야별로 제출하되 단권으로 제출 가능

	2		중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공종
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	내역서(관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	지반조사보고서	A4	3	부		◯
7	관련법규 조사서	A4	5	부
8	조감도(기본)	A4	3	부	◯
9	기타 발주기관 요구사항

* 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 별표2 참고

** 위 제출목록 전부를 USB로 제작하여 제출

*** 위 제출목록은 분야별로 제출하되 단권으로 제출 가능

	3		실시설계 납품도서

가. 아래 표 5-2 실시설계 납품도서 제출목록 전부를 USB로 제작(3SET)하여 제출한다.

※ 실시설계 최종납품도서, 각종심의자료, 인허가 관련 문서, 회의록, 각종 발표자료 포함

[실시설계 납품도서 제출목록]

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	완료보고서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	인테리어 도면포함
	설계도면 (반책도면)	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	관급내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
9	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	일반시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	특기시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
14	인허가관련자료		3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
15	각종인증서 및 예비인증서		3	식	◯			◯	◯			BF인증, 에너지효율 인증, 제로에너지인증 등
16	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등
17	조감도,투시도	조감도(A가., 투시도(A가. 각 1점, 실내투시도(주요실) 3점 (이미지 파일 및 출력물)										액자포함
18	기타 발주기관 요구사항

제6장		각종 서식

[서식 1]

보  안  각  서

1. 용  역  명 : 진안 학천지구 복합플랫폼 구축사업 설계용역

2. 계약  일자 : 20  .   .   .

3. 착수  일자 : 20  .   .   .

4. 완수예정일 : 20  .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 계약예규 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용과 비밀엄수 의무)에 따라 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 따라 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 건설기술(설계)용역계약 특수조건 제12조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20  년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

진안군수 귀하

[서식 2]

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 : 진안 학천지구 복합플랫폼 구축사업 설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

진안군수 귀하

[서식 3]

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 : 진안 학천지구 복합플랫폼 구축사업 설계용역

2. 계약  금액 :               원

3. 계약  일자 : 20  .   .   .

4. 착수  일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게     분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 건설기술(설계)용역계약특수조건 제5조에3. 따라 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

진안군수 귀하

[서식 3-1]

하도급신청 자체 검토서

용 역 명	진안 학천지구 복합플랫폼 구축사업 설계용역
하도급 분야
하도급 계약일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건
책임기술자 기술자격 및 경력증명서
참여기술자 기술자격 및 경력증명서
하도급 금액 및 비율
하도급 사유

[서식 4]

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 : 진안 학천지구 복합플랫폼 구축사업 설계용역

2. 계약금액 :

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완료예정일 : 20  .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

진안군수 귀하

[서식 5]

주 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 : 진안 학천지구 복합플랫폼 구축사업 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월   일  ~  20  년  월  일

◦계약금액 :             원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항( . .)	금주예정사항( . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

진안군수 귀하

[서식 6]

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 : 진안 학천지구 복합플랫폼 구축사업 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20 년  월  일 ~ 20 년  월  일

◦계약금액 :                원

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 ( . . ~ . .)	비 고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익 월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

진안군수 귀하