- 한국항공고등학교 기숙사 증축공사 -

과업지시서

2025.  07.

[강원특별자치도태백교육지원청]

-  목         차  -

제1장 총칙

1. 과 업 명	1

2. 과업목적	1

3. 과업개요	1

4. 발주자 요구사항	2

5. 일반사항	4

6. 행정사항	6

제2장 업무수행지침

1. 조사 및 자료수집	12

2. 계획설계	13

3. 중간설계	14

4. 실시설계	15

제3장 기술지침

1. 공통분야	18

2. 건축분야	18

3. 토목분야	20

4. 조경분야	23

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통사항	29

2. 계획설계	29

3. 중간설계	31

4. 실시설계	38

제5장 성과품의 작성 및 납품

1. 일반사항	44

2. 성과품의 작성	46

3. 성과품의 납품	54

【부록】

[붙임 1] 착수계	58

[붙임 2] 사용인감계	59

[붙임 3] 책임기술자 선임계	60

[붙임 4] 참여기술자 현황	61

[붙임 5] 분야별 책임기술자 선임계	62

[붙임 6] 공동수급표준협정서	63

[붙임 7] 참여기술자 각서인	66

[붙임 8] 하도급 승인요청서	67

[붙임 9] 보안각서	68

[붙임 10] 설계검사원	69

[붙임 11] 주간공정보고	70

[붙임 12] 월간공정보고	71

[붙임 13] 협력기술자 보고	72

[붙임 14] 설계용역 자문 참여기술자 명단	73

제1장 총칙

1. 과 업 명: 한국항공고등학교 기숙사 증축공사

2. 과업목적

본 과업은 “한국항공고등학교 기숙사 증축공사”를 위한 계획설계, 중간설계 및

실시설계를 수행함에 목적이 있다.

3. 과업개요

1) 과업내용

(1) 대지위치: 강원 태백시 장성동 98 외13필지

(2) 대지면적: 43,910,00㎡

(3) 용도지역: 제2종 일반주거지역, 도시지역(도시계획구역), 역사문화환경보존지역

(4) 규    모: 총 연면적 1,308 ㎡내외 (법적 용적률 250%이하)

(발주처와 협의하여 연면적 ±5% 이내 조정 가능)

(5) 층    수: 지상 3층 (증축)

(6) 건축물 용도: 교육연구시설(기숙사)

※ 건물규모 및 주요시설은 참고 사항으로 발주기관 의견 등에 따라 예산범위 내에서 조정 가능하므로 상호 협의 후 지시에 따를 것

(7) 위치도 및 전경사진

위치도	현황사진

2) 추정공사비: 4,922,895,000원 (VAT포함)

(1) 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방, 기계설비, 폐기물 처리 등에 대한 전체	공사비임. (전기, 통신, 소방, 기계설비 분리 발주 예정)

(2) 전체 공사비에는 각종 시설분담금, 법정 소요비용이 포함됨.

3) 설계용역 금액: 공고서에 따름

설계용역에는 건축, 토목, 구조, 분야 등의 기본, 중간 및 실시설계, 건축협의(허가) 및 건축행정시스템을 통한 착공 전 착공신고 및 건축물 준공 후 건축물대장 작성 및 제출 등 제반 인허가와 본 공사에 해당되는 건축위원회 심의, 계약심사 등의 법적사항에 대한 모든 업무가 포함되며 설계용역비에는 건축물에너지효율등급 예비인증, 제로에너지건축물(4등급 이상) 예비인증, 설계VE, 설계안전성검토, 안전보건대장작성, BF예비인증 등 모두 포함됨.

4) 과업기간: 착수일로부터 6개월(각종 인증, 건축허가 등 인허가, 기술심의 등 행정절차 제외)

(1) 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 발주기관과 협의 후 요구사항에 응해야 한다.

(2) 다음 경우에는 감독관의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.
용역계약 일반조건에 따라 계약기간의 연장, 용역의 일시정지, 계약상대자의 용역정지, 발주기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우 등

4. 발주자 요구사항

1) 설계조건

(1) 본 과업의 건축물은 본연의 기능을 충분히 발휘할 뿐만 아니라 기존 한국항공고등학교 기숙사동(19동 및 20동)과 조화를 이루며 학생들에게 편의성과 안전성을 제공하고, 미래의 변화에 대응할수 있는 공간의 확장성과 융통성을 갖도록 설계되어야 한다.

(2) 설계자는 치수, 재료 건물 구성 요소의 설치와 관련하여 현재 건설 산업에서 사용되고 있는 표준적인 방법과 시공성을 채택하여 설계하여야 한다.

(3) 설계자는 수급 문제로 정상적인 공정이 방해되거나 공정 지연이 발생할 수 있는 건축 재료, 공법 또는 기타 요소로 설계하여서는 안 된다.

(4) 설계자는 관련 법규와 계약조건, 발주기관의 요구조건을 만족하는 설계를 하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 발주기관에 보고할 책임이 있으며, 관계법규 및 계약서 검토, 발주기관과의 협의 등을 통하여 그에 대한	적절한 해결책을 모색하여야 한다.

(5) 설계자는 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 한다.

(6) 설계자는 본 과업내용서 외에 관계 규정 및 각종 시행기준을 준수하여야 하며,	본 과업내용서와 상이한 부분이 있을 때에는 발주기관에 보고 후 적용기준을 결정하여야 한다.

(7) 설계자는 용역 종료 후에도 공사 진행 과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로	설계변경 등이 필요하여 발주자가 이에 대한 보완자료 및 변경도서를 요구하는 경우 설계자 자신의 비용으로 지체 없이 이를 수행한다.

(8) 유지관리가 용이하고, 운영비용을 최소화할 수 있도록 계획한다.

(9) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 」제7조에 따라 법령에 적합하도록 설계하여야 한다.

(11) 이 과업내용서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인 후 채택될 수 있다.

(12) 기타 건축법 제 11조에 따라 다른 법률의 허가를 받거나 신고를 한 것에 대한 정확한 현장조사와 원활한 공사 추진에 지장이 없도록 일괄 처리될 수 있게 표기하여 관련 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

2) 심의, 자문, 협의 등의 이행

(1) 설계자는 각 설계단계별 각종 심의, 자문, 협의 등 이행하고 설계에 반영 하여야 하며,	발주기관의 요청에 따라 분야별 책임기술자 등과 함께 참석하여 성실히 답변하여야 한다.

(2) 설계자는 실시설계 완료전 계약심사를 준비하고, 심사결과를 반영하여 최종 성과품을	납품하여야 한다.

(3) 계약심사 결과를 반영한 것을 최종 성과품으로 본다.

3) 관련 기관 협의 조건

(1) 설계자는 과업수행 전 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상·하수도관, 전기, 전화, 통신망 등) 등을 사전 확인 후 발주자에게 보고하여야 하며, 관련 설계는관련기관(부서)과 협의 이행 후 진행하여야 한다.

(2) 설계자는 본 설계과업의 완료에 필요한 각종 관련기관, 부서 등의 협의, 신고, 허가, 설계변경 등 행정절차 이행에 필요한 관련 서류 작성, 제출, 수행행하여야 하며, 결과를 설계에 반영하여야 한다.

4) 기타

(1) 각종 심의, 심사, 자문, 회의 및 관련기관 협의 등 위해 필요한 제반 비용은 설계자가 부담하여야 한다.

(2) 사업개요상의 용도는 실사용 용도를 제시한 것으로 설계자가 건축법 등 제반 법규를 검토하여 관련법규 및 기준에 적합하게 설계하고 제반 행정절차를 이행하여 공사시행에 지장이 없도록 하여야 한다.

5. 일반사항

1) 설계자의 업무기준

(1) 설계용역 착수와 동시에 용역 관계자는 설계용역의 목적과 과업내용을 완벽히 숙지하여야 한다.

(2) 용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 설계자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

(3) 설계도면은 “건축물의 설계도서 작성기준”(국토교통부고시) [별표] 설계도서 작성방법에 따라 계획설계, 중간설계(기본설계), 실시설계 도서를 작성한다.

(4) 안전사고 예방사례를 분석하여 위험공종을 목록 화하고 안전사고 예방을 위해 꼭 지켜야 할 사항을 검토하여 설계 시 반영토록 하며 아래의 내용을 포함하도록 한다.

① 콘크리트 타설 등 주요 공종 시 안전대책

② 우기 시 및 동절기 안전대책

③ 유지관리 종합안전 대책 등

2) 계약 관계

(1) 본 과업지시서에서 제시된 사항은 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분 명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주자와 협의하여 정한다.

(2) 업무 내용의 변경은 발주자와 설계자가 문서를 통해 상호승인을 하여야 하며, 이는  계약 변경의 근거 서류가 된다.

(3) 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건(행정안전부 예규)에 따른다.

(4) 발주자는 본 과업수행 중 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경사항 이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있다.

(5) 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 설계자의 기술용역정지, 기술용역에 있어서의 이행보증 등은 지방자치단체 용역계약일반조건(행정안전부예규)에 따른다.

(6) 다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 과업 수행에 대한 서로간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 설계자간의 업무 한계를 명확히 구분하여 계약서 작성시 제출한다.

3) 설계에 사용하는 재료

(1) 공사에 사용하는 각종재료와 제품은 한국산업표준(K.S), 각종 표준시방서규정에 적 합한 것으로 경제성, 사용성, 내구성, 유지보수의 용이성, 친환경등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계에 반영하여야 한다.

(2) (1)를 적용할 수 없는 재료 또는 제품에 대하여는 “발주자”의 승인을 받아야 하며, 설계서에 KS, 표준시방서 규정과 동등 이상의 규격을 사용하도록 공사시방서  및 설계도면에 명시하여야 한다.(단, 외국산 자재 사용이 필요한 경우 선정사유 및 근거자료, 주요자재의 수량, 단가, 금액 등을 발주자와 협의후 채택한다)

(3) 설계자가 특정제품(공법, 기술)을 사용하고자 하는 경우에는 그 효과, 시공성, 경제  성, 적용사례, 유지관리상 문제점 등을 종합적으로 검토한 후 적정한 것으로 판단되는 경우에 한하여 발주자의 승인을 득한 후 설계에 반영한다.

(4) 정부기관(국토교통부, 산업통상자원부 등)에서 인정한 신기술, 신공법 및 고효율 인증제품 중 본 과업 특성에 맞는 것은 적극 검토 및 적용하여야 한다.

(5) 건축물에 사용하는 자재는「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 및「2023년도 녹색제품 구매지침」에 따라 친환경인증자재(환경마크 인증제품) 사용을고려하고, 적용시에는 설계서에 친환경 인증자재임을 표기한다.

(6) 설계자는 건설폐자재 등 친환경 자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

(7) 설계자는 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조에 따른 공사용 자재 직접구매 대상품목에 대한 적용여부를 검토하여야 한다.

(8) 관급자재와 사급자재는 명확히 구분한다.

4) 신기술, 신공법의 도입

(1) 설계자는 건설기술진흥법 제14조에 따라 신기술이 기존 기술에 비하여 시공성 및 경제성 등에서 우수하면 건설공사에 반영할 수 있다.

(2) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영 시에는 발주자에게 검토 보고서를 제출하여야 한다.

5) 용역수행자의 교체

(1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 경험과 자격을 갖추어야 하며, 발주기관은 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 용역수행자의 교체를 요구하여 교체할 수 있다.

(2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 또는 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급·경력을 갖춘 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

(3) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

6) 사용언어 및 문자

과업 수행 상 사용되는 언어는 한국어와 아라비아 숫자가 우선이며, 외국어

통역 및 번역 필요 시 소요되는 비용은 설계자가 부담한다.

7) 보안 및 비밀유지

(1) 설계자는 발주자와 업무 수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료를	발주자의 승인 없이 공개해서는 안 된다.

(2) 설계자가 작성한 모든 성과품은 이를 공개, 공모 기타 이와 유사한 다른 행위에	앞서 발주자에게 최초로 제출되어야 한다.

(3) 설계자는 발주자와의 검토 및 승인 창구를 단일화 하고, 일정한 양식으로  체계화	하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

8) 기 타

(1) 설계용역 성과물에 대한 모든 저작권 및 활용권은 원주시에 귀속되며, 저 작권은 복제권, 임의변경권, 광고 및 홍보사용권, 특허권 등 작품에 대한 모든 권리를 포함한다.

(2) 설계자는 부실설계 또는 과다한 공사비 증액을 예방하기 위하여 건설기술 진흥법 제34조, 설계·감리 등 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시), 건축사법 제20조에 따라 용역손해배상보험을 가입하여야 한다.

6. 행정사항

1) 공정계획 작성

(1) 설계자는 설계용역의 공정에 대하여 네트워크(Net Work)공정표 또는 발주자가 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안하여 발주자의 승인을 받는다.

(2) 공정은 모든 일정이 서술되어야 하고, 설계자는 발주자가 승인한 공정 계 획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

(3) 공정 계획은 용역 착수 시 뿐만 아니라 용역 수행 과정에서도 항상 재검토되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

3) 착수신고서 제출

(1) 설계자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

① 착수신고서

② 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 자격증 사본 첨부)

③ 설계용역 예정공정표

④ 용역비 내역서

⑤ 분야별 참여기술자 및 장비투입 계획서

⑥ 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

(2) 설계자는 필요 시 다음 제반서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

① 용역 기성부분 검사원

② 용역 준공기한 연기원

③ 용역 준공검사원

④ 하도급통지 및 하도급 승인요청

⑤ 기타 용역 수행에 필요한 사항

4) 과업수행계획서 제출

설계자는 착수일로부터 15일 이내에 아래내용이 포함된 과업수행계획서를 작성 제  출, 발주자의 승인을 받아야 한다.(과업수행계획서는 본 용역 계약서류의 일부로    간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

① 각 관련 주체(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 색채 등)간의 업무범위와책임

② 분야별 책임기술자(붙임참조) 및 참여기술자 조직표

※ 전문분야별 기술자는 견적 및 내역작성, 공법,기술을 지원하는 전문	건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련주체의 작업반 구성이 되도록	구성한다.

5) 하도급 신고

(1) 설계자는 본 용역과업과 관련된 모든 사항에 대해 발주자의 사전승인 없이는 타업체에 하도급을 할 수 없다.

(2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

① 각종 조사․측량 및 이와 유사한 작업

② 지질 및 토질 조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

③ 건설공사의 수량 내역서 작성 및 견적업무

④ 건축물에너지효율등급 및 제로에너지건축 예비인증 취득에 필요한 작업

⑤ 신·재생에너지 설비 의무설치에 대한 검토

⑥ 장애물 없는 생활환경 예비인증 취득에 필요한 작업

⑦ 설계안전성 검토(해당시)

⑧ 안전보건대장 작성

⑨ 기타 발주처에서 특별히 인정하는 업무

(3) 설계자는 발주자로부터 사전승인을 득하여 하도급 계약을 체결한 경우에는

그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주자에게

통지하고 관리를 받아야 한다.

① 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

② 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

③ 하도급 기간 및 하도급 금액 등

(4) 설계자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

① 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

② 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

(5) 설계자는 하도급 부분에 대하여 발주자로부터 기성금 및 준공금을 지급 받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다. 이를 어기거나 대금을 어음으로 지급 하는등 태만할 경우에는 발주자가 직불할 수 있으며 이때 계약상대자는 동의 하여야 한다.

(6) 책임한계 : 하도급으로 시행한 당해 설계 성과는 전적으로 설계자의 책임으로 한다.

6) 업무협의 및 공정보고

(1) 설계자는 착수신고서 제출 시(계약 후 7일 이내) 발주자와 1차 업무협의를 한다.

(2) 2차 업무협의는 과업수행계획서 제출 시(착수일로부터 10일 이내)에 하고 이후	다음과 같은 경우에 업무협의를 한다.

① 각종조사 및 자료 수집 완료  또는 주요공법 결정시

② 계획설계 완료시

③ 기본(중간)설계 완료시

④ 실시설계 완료시(유지관리 계획 포함)

⑤ 각종 심의·심사 및 자문회의, 공공협의 시

⑥ 약심사 및 건설기술심의 시

⑦ 공정보고 시(필요 시)

⑧ 준공 및 성과품 작성 시

⑨ 기타 발주자가 필요하다고 판단 시

(3) 상기 협의를 포함하여 과업수행기간 동안 발주자와 설계자는 월1회 이상의 업무협의를 갖는다.

(4) 과업수행계획서의 예정공정표상 공정이 지연될시 설계자는 즉시 부진공정 만회대책을 수립·보고하여야 한다.

(5) 설계자는 다음과 같이 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준하여 공정보고서(대표자 명의)를 작성하여 발주자가 정하는 방식에 따라 보고하여야 하고, 착수와 동시에 작업일지를 작성하여야 한다.

① 주간보고 : 주1회 작성

② 월간보고 : 월1회 작성

③ 수시보고 : 발주자 요청 시

7) 발주자의 중간 검토

설계자는 발주자 및 사업의뢰부서의 다음과 같은 중간 검토에 필요한 제반 서류를 제출하고, 발주자의 확인절차를 거쳐 다음 단계의 설계를 진행하며, 서류의 제출에 따른 비용은 설계자의 부담으로 한다.

① 용역착수 및 과업수행계획서 제출 시

② 계획설계 시 : 공정 20%

③ 중간설계 시 : 공정 50%

④ 마무리 단계 : 성과품 작성 전

※ 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 발주자와 협의 후 사업의뢰부서의 의견을	설계에 반영하여야 하며, 발주자, 사업의뢰부서 필요시 각 설계단계 및 납품 완료	전 보고회 등을 개최할 수 있다.

8) 설계검토, 각종심의 및 자문 사항의 반영

(1) 본 과업과 관련한 각종 심의 및 자문사항(기술자문, 경관심의, 계약심사등)은 설계에 반영하여야 하며 부득이 반영하지 못할 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 한다.

9) 관련기관 인·허가 및 협조

(1) 설계자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축협의에 필요한 서류를 작성하여	제출하여야 한다.

(2) 설계자는 과업수행 전 부지 내․외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상․하수도관, 기타) 및 도시가스의 공급가능 여부, 전기․전화 공급지점등을 설계자의 책임 하에 관련기관(부서)과 협의한 후 설계에 반영하여야한다.

(3) 설계자는 발주자와 사업의뢰 부서의 단계별 설계안 검토의견을 적극 반영 하여야 한다.

(4) 인·허가나 협의 승인 시에 필요로 하는 제반 비용의 부담을 설계자가 하여야 한다.

10) 주요업무의 사전승인

계약상대자는 다음 사항에 대하여 발주기관과 사전에 협의하여 과업을 수행한다.

(1) 과업수행계획서 및 착수신고서 내용 변경

(2) 타당성조사를 포함한 주요 설계내용 및 방침의 설정 또는 변경

(3) 관계기관과의 협의사항

(4) 용역수행자의 교체

(5) 설계기준의 설정 또는 변경

(6) 하도급사항

(7) 공공측량계획

(8) 기타 감독원의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

11) 사정변경에 따른 계약의 해제, 해지 등

(1) 발주기관은 불가피한 사정이 발생한 때에는 계약을 해제․ 해지할 수 있다.

(2) 계약의 해지일 이전에 수행이 완료한 부분에 한하여 대가를 지급할 수 있다.

(3) 기타 계약의 해제 또는 해지, 기술용역의 일시정지, 설계자의 기술용역 정지, 기술용역의 이행 보증 등은 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 (행정자치부 예규) 제14장 용역계약 일반조건에 따른다.

12) 용어의 해석

과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

13) 기타

(1) 설계자는 착수와 동시에 작업일지를 작성하여야 한다.

(2) 업무연락은 설계자와 발주자가 상호근거를 남길수 있는 방법으로 수행해야한다.

제2장 업무수행지침

1. 조사 및 자료수집 단계

1) 현지답사

(1) 설계자는 현지를 답사하여 대상지 및 주변지역의 지형·지질 등의 자연 상황, 주변도로, 용지조건, 현재 상황, 주변현황, 사용조건, 사업시행 시 교통·환경 등 민원발생 요소분석, 법규사항 등을 상세히 파악하여야 하며, 계획 시설물이 현지 조건에 적합 한지의 여부를 확인한다.

(2) 현지답사 시에는 반드시 주변건물, 도로, 담장 등 시설물의 균열 등을 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고 향후 민원발생, 설계 공정계획 수립 또는 주변안전을 고려한 설계 등에 참조한다.

(3) 주변 기존 건축물의 각종 도면 등을 확보하고 현장점검 등을 통해 안전성을 확보한	신축방안을 제시한다.

2) 지장물 조사

(1) 설계자는 계획 구간 내 각종 지하 매설물 및 지상 시설물에 대한 정확한 현장 및 자료를 조사하고 도시가스, 전력 등 유관 기관과 협의하여 설계 시 지하 시설물을 누락하지 않도록 하여야 한다.

(2) 지하시설물이 집중되거나 관로 접속구간, 직접 확인이 필요하다고 판단되는 지역은 실시설계 시 줄파기를 실시하거나, 줄파기 등이 어려울 경우 GPR 탐사나 전자유도탐사법 등 간접 확인 방법을 발주자와 협의하여 시행하여야 한다.(설계변경 또는 준공시 정산)

(3) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당 기관과 협의한 후 이설 설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

(4) 이설계획은 지장시설물 관리부서의 확인을 거쳐 이설가능 여부 및 공사 착공후 이설시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을 공사기간 에 산입하여야 한다.

(5) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과협의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

(6) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기한다.

3) 배수시설 조사

(1) 계획 대지 주위의 하수 처리 시설을 조사한다.

(2) 암거 및 배수구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의

규격을 결정하며 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

(3) 현지조사 항목

① 과거최고 홍수위

② 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

③ 하천의 현황

(4) 자료수집 항목

강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

4) 토취장, 골재원 및 사토장 조사

(1) 공사 수행 시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사하여 설계에 반영한다.

(2) 골재원의 위치, 종류, 생산량 등을 조사하여 설계에 반영한다.

5) 기타

(1) 건립부지 현장실측조사 등을 통해 설계서를 작성하고 주변여건 및 인접지안
전성을 함께 조사 검토하여 설계에 반영하도록 한다.

(2) 본 건축물 건립에 따라 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을조사
검토한다.

2. 계획설계

설계자는 조사 및 자료수집단계에서 발주자에 제출․승인된 자료에 의하여 다음과

같이 계획설계를 수행한다.

1) 업무내용

(1) 설계자는 사업의 명확한 범위에 대하여 발주자의 승인을 득한 후 요구되는
수량의 도서와 추정 공사비의 산출서를 작성한다.

(2) 계획의 내용은 다음과 같다.

① 설계대상이 되는 건축물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적 조건을
확정하기 위해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등의 업무

a. 각종 법령 검토 및 이에 따른 제약조건 정리

b. 부지의 입지조건

c. 유지관리상의 조건

d. 자연적 환경 조건 - 기상, 지형․지질, 동․식물, 수리․수문 등

e. 사회·경제적 환경 - 인구·주거, 교육, 교통, 문화재 등

f. 생활·환경적 조건 - 토지이용, 대기질, 수질, 토양, 폐기물, 소음·진	동등

g. 건축물의 배치 계획상의 조건

h. 시공상의 기술적 조건

② 설계대상이 되는 건축물의 공사비예산을 확정하기 위해 필요한 업무

a. 개략설계에 따른 공사비 산출

b. 유사 규모 건축사례 조사 및 공사비 적정성 검증

③ 설계대상 건축물이 주변 환경에 미치는 영향

④ 건축물의 각 기능별 소요 공간에 대한 요구 조건의 프로그램을 제출한다.

2) 착수

(1) 기본계획 착수 시 사업 관련 분야 관계자 회의를 개최하고, 이때 대지 현황, 설계 기준 또는 자료, 계약 조건 등과 같은 모든 사항들이 토의되어야 한다.

(2) 설계자는 과업수행 체크리스트와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을작성하여 제출하여야 한다.

3) 성과품 제출

제출 도면은 국토교통부장관이 고시한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준” [별표2]에 의한 계획설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성·제출한다.

3. 중간설계(기본설계)

설계자는 사전 조사 및 기본계획 단계에서 발주자에 제출․승인된 결과에 따라

다음과 같이 중간설계를 수행해야 한다.

(1) 설계자는 발주자가 요구하는 기본설계안을 준비하여 제출하여야 한다. 이들  은 지역 지구에 따른 건축 법규 분석과 추정 공사비 산출을 포함한다.

(2) 외벽, 지붕, 구조와 실의 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야 한다.

(3) 설계 요구 조건을 만족해야 한다.

1) 업무내용

(1) 계획을 실행하기 위한 공사비 및 시공성의 검토

(2) 시설 입면, 평면, 단면 계획의 수립

(3) 구조 및 토목 계획의 수립

(4) 에너지 절약계획의 책정 및 대체에너지 설비계획(관계규정의 의무비율 적용)

(5) 인허가 및 승인을 위한 기술 자료의 작성 및 기술적 검토

(6) 관계 기관 및 이해 당사자의 의견 등에 관한 기술적 검토

(7) 지반 조사 및 인접 구조물의 조사에 관한 기술적 검토

(8) 기타 발주자 및 수요자 요구사항 검토 자료 수립

2) 착수

설계자는 과업수행 점검표와 공정 계획, 각 단계별 승인요청의 일정 등을 작성

하여 제출한다.

3) 성과품 제출

제출 도면은 국토교통부장관이 고시한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준” [별표2]에 의한 중간설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

4. 실시설계 단계

설계자는 계획설계 및 중간설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 건설

공사의 실시설계를 하여야 한다.

(1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해
시설물의 유지관리에 필요한 비용․인력․장비 등 유지관리방법을 제시한다.

(2) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에
관한 사항이 충분히 검토․반영되도록 한다.

(3) 공사기간의 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍․혹서․혹한 등
작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

(4) 중간설계도서와 공사비 산출서가 발주자에 의해 승인되고 실시설계의 착수가지 시되면, 설계자는 발주자의 공사계약에 요구되는 도서를 준비해야 한다.

(5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 공사시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주자가 승인하는 공사 공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를

포함한다.

(6) 도면과 공사시방서는 공간 요구 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

(7) 설계자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로발주자
에 제시하여야 하며, 발주자의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에는 설계자가 도면을 수정한다.

(8) 설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 설계자가 책임을 지고 협업․조정하여야	한다.

1) 업무내용

(1) 중간설계에 의한 설계 조건 및 설계방침 결정

① 외·내부 공간 및 입면, 평면, 단면 등 상세설계

② 각 부분 사용 재료 및 시방의 결정

③ 유지관리 및 관계법령 등의 조합 및 검토

④ 공사비의 검토

⑤ 관련시설 및 수요자의 요구사항 결정

(2) 기타 (추가용역)

① 건축 계획 통지 이외의 각종 법령 수속을 위한 기술 자료의 작성 또는

기술적 검토

② 표준 성과도서 이외의 자료 작성

2) 착 수

사업 관련 분야의 관계자 회의를 통해 설계자의 공정과 계획 및 기본설계도서의이해에 대한 주요한 결정을 토의하여 최종 실시설계도서 준비에 착수한다. 설계자의 공정 계획의 검토, 초기 계획의 제안을 통해 용역 계약에서 의도하는 모든부분이 명확히 이해되도록 한다.

3) 공사시방서 작성

설계자는 건축, 토목, 조경 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 공사 표준시방서에 맞게 작성하고 자재․입찰절차․공사비․공사여건 등을고려하여 공사조건에 적합하게 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는 관련표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성하여 발주자의 확인을 받아야 한다.

4) 색채와 재료 선정

설계자는 색채와 재료의 견본을 발주자에 제출하여 승인을 받아야 하며, 재료의 지정색은 주변과의 색상조화를 고려하고, 색채계획은 전체적인 색상(외부 및 실내마감재)이 조화가 이루어지도록 계획한다.

(1) 외부 마감 재료 계획

(2) 내부 마감 재료 계획

(3) 색채 계획

5) 공사비 산출

(1) 설계자는 실시설계 시 총사업비 및 예정공사비를 감안하여 공사비 통제를 하여 설  계단계별로 확인하여야 하며, 변경이 필요할 때는 발주자에 자문 또는 승인을 받는다. 만약, 공사비 한계를 초과할 우려가 있는 경우 설계자는 즉시 발주자에게 보고 및 비용 절감을 검토하여야 하며, 공사비가 예산범위 내 작성될 수 있는 의견을 발주자에 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 발주자는 공사시행을 위한 예산조정을 위해 수시로 공사비 산출금액 등을 요구할 수 있으며, 설계자는 이에 즉시 산출서를 작성·제출하여야 하며, 예산범위 내 공사가 될 수 조치하여야 한다.

(3) 설계자는 총 공사비 산출서를 작성한 후 발주자에 제출하여 확인을 받아야	한다.

6) 최종 현장 방문

사업 관련 분야의 관계자들은 최종 도서 승인요청 전에 현장을 방문하여야 한다. 최종 현장방문 중 재검토해야 될 사항은 아래와 같다.

(1) 대지의 현황

(2) 공사에 영향을 미치는 조건

(3) 자재 야적장, 현장 사무소, 기타 공사 관련 지원 시설

(4) 설계에 반영되지 아니한 새로운 사항의 존재여부

(5) 기존 공급시설의 변경사항

(6) 기타 발주자가 요구하는 서류

7) 최종 성과품 제출

설계자는 최종 성과품을 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 국토교통부장관이 고시한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와 대가기준” [별표2]에 의한 실시설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성하여 제출한다.

제3장  기술 지침

1. 공통분야

1) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

2) 건축, 토목, 조경, 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

3) 에너지 절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

4) 설계자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해  야 하며, 사전조사 시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 기타 발주자 측의 요구사항 반영

2. 건축분야

1) 평면계획

(1) 각 공간, 실별로 다르게 요구되는 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지 등의 성능에 대해서는 공간별, 실별 요구성능을 만족하도록 설계하여야 한다.

(2) 장애인을 위하여 “장애인, 노인, 임산부등의 편의증진보장에 관한 법률”등 관계법령에서 정한 시설, 규모 및 구조로 설계하여야 하고, BF인증(대상일 경우) 기준에 맞게 설계하여야 한다.

(3) PD, AD, EPS, TPS, 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

(4) 건축물의 재해를 방지할 수 있는 대책이 고려된 내진설계가 되도록 한다.

(5) 지질조사 검토보고서를 참고하여 구조, 시공, 경제적인 설계가 이루어져야 한다.

(6) 제반 부수 시설의 가구 등은 그 종류, 필요위치, 소요개수 등을 면밀하게 분석 및 검토하여 실시설계에 반영할 수 있도록 충분한 계획 및 자료를 제시한다.

(7) 건축물의 구조계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 한다.

(8) 기타 세부계획 및 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주자의 해석에 따른다

2) 입면계획

(1) 건물의 외관은 기존 한국항공고등학교 기숙사동(19동 및 20동)과 조화롭고 어울릴 수 있도록 입면을 계획한다.

(2) 디자인 요소는 통일된 개념의 모듈을 활용하여 공사비 절감 및 공사기간이 단축되도록 계획한다.

(3) 건축물 외벽에 설치되는 창호 및 외장재는 안전한 구조로 설계하여야 한다.

(4) 외부 CI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획한다.

(5) 내구성 및 내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료로 계획한다.

3) 재료 및 색상계획

(1) 사용자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고, 내구성, 내화성, 내후․내식성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질과 마감방법을 선택한다.

(2) 사용자재는 불연 재료로 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용시 방염처리를 소방 관련법 및 관계 규정에 맞도록 설계한다.

(3) 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비 오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해물질이 적은 친환경 재료를 선정하도록 한다.

(4) 로비, 홀 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜되며 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 선정한다.

4) 구조계획

(1) 시설 기능에 적합한 구조시스템을 도입한다.

(2) 내진설계 등 제반 규정에 적합한 안전한 구조계획을 수립한다.

(3) 공사비를 고려하여 경제적으로 설계하여야 한다.

(4) 대지의 지질조사 검토보고서를 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

(5) 정확한 기초설계를 바탕으로 안전한 구조를 반영하여야 한다.

5) 주요자재 사용계획

(1) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

(2) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서	발주자와 협의하여 선정한다.

(3) 부득이 수입자재 등을 사용 시에는 사전에 발주자와 협의하여 결정한다.

(4) 관급자재 및 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하여야 한다.

6) 기타 계획

(1) 시설내부에서 외부 보행동선을 쉽게 관찰할 수 있도록 계획하고, 시설 입구에	CCTV, 보안등 도입을 통한 보안 확보를 계획한다.

(2) 은폐장소의 최소화, 자연감시를 위한 개방형 공간조성, 야간 가시성 극대화를 계획한다.

(3) 외부공간의 경우, 자연적 감시가 용이한 외부공간을 조성하고 수목에 의한사각지대가 생기지 않도록 유의한다.

2. 토목분야

1) 공통사항

(1) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획 설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

(2) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

(3) 계획도면은 종합계획도를 작성하고 배수계통도, 포장 평·입·단면도, 하수계획도면을 세분하여 작성한다.

2) 측량

(1) 일반사항

① 측량조사는 기본설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성과 구조물의 안정성을 확보하는데 있다.

② 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련 규정에 따라 시행한다.

③ 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독자의 승인을 득한 후 실시한다.

④ 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

⑤ 발주기관이 서면 지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산한다.

⑥ 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

⑦ 조사 내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

(2) 조사측량(필요하다고 판단하여 측량할 경우 비용은 발주처와 상의한다.)

① 경계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 측량한다.

② 현황측량은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

③ 측량면적은 사업경계선으로부터 주의의 여건 및 설계수행을 감안하여 결정한다.

④ 측량일수는 측량면적, 축척, 지형조건, 인원수 등에 따라 표준품셈에 의하여 산정된 작업량을 기준으로 산정한다.

⑤ 가 수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

⑥ 좌표는 임시용으로서 목항, 석항, 도로경계석, 노출암반 등을 측점표지로 사용하며, 위치는 기계 설치에 지장 없는 양호한 지반에 설치한다.

⑦ 트레버스측량, 수준측량, 평판측량을 병행하며 지형표시는 등고선법으로 표시한다.

⑧ 측량이 공공측량에 해당할 경우 관련 법령 및 기타 관련 규정을 준수하여야 한다.

가) 공공측량 실시 전 공공측량 작업수행계획을 수립하고 「공간정보의 구축  및 관리 등에 관한 법률」 제 17조 2항에 따른 공공측량 작업계획서를 제출하여야 한다. 작업계획이 변경되는 경우도 이와 같다.

나) 공공측량이 완료되면 준공 전에 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법  률」 제18조 및 같은법 시행규칙 제22조에 따라 공간정보품질관리원에 공공측량성과심사의뢰를 위한 공공측량 성과자료를 제출하여야 한다.

다) 공공측량 성과심사 결과 확인된 오류사항은 수정하여 제출하여야 한다.

⑨ 표시항목

현황측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, 주변도로 도시계획도로선, 철탑 및 전주 등, T.B.M, 수로 및 농로 등, 지하구조물, 지하 지장물, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

3) 토공 및 흙막이 설계

(1) 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기하여야 한다.

(2) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 기본 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 한다.

(3) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성(Trafficability)을 확보토록 한다.

(4) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계(해당시)는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

(5) 흙막이 설계(해당시)에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지질조사 결과 또는 관련 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용근거를 첨부하여야 한다.

(6) 흙막이 시공(해당시)을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영하여야 한다.

(7) 흙막이 설계(해당시)는 경제적이고 합리적인 공법을 선정하여야 하며 공법선정은 반드시 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

4) 구내 우․오수 설계

(1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

(2) 배수시설 계획은 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

(3) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150～200㎜ 이상이 되도록 한다.

(4) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

(5) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

(6) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 한다.

(7) 원주시 하수도정비 기본계획에 의거 설계하여야 한다.

(8) 관종, 접합방법 등은 장·단점을 비교하여 발주처와의 사전협의 등을 거쳐 결정한	다.

5) 도로 및 포장 설계

(1) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

(2) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.

(3) 도로 및 주변광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

(4) 지질조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 주변도로 및 포장 설계 시 P.P. Mat 및 PET Mat 등의 적용을 검토하여야 한다.

(5) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

6) 상수도

(1) 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

(2) 상수도는 신규건물과 연계하여 설계하여야 한다.

(3) 관종, 접합방법등은 장, 단점을 비교하여 발주처와의 사전협의 등을 거쳐 결정한다.

7) 주차장

(1) 주차장의 구조는 차량주행 동선 및 통행차량 안전을 최대한 확보할 수 있도록 하여야 한다.

(2) 주차장 형태 및 구조와 평면위치 및 계획, 주차계획, 진출입계획, 관리동의 배치 및 세부시설계획 등 주차장계획관련 전반에 대하여 용역과정 착수시 발주처와 협의하여 과업을 수행하여야 한다.

8) 기  타

(1) 부지 경계부근은 도로, 인접토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

(2) 일반적인 부지내의 비탈면의 구배는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획하여야 하나, 비탈면의 구배가 높을 경우(5m 이상)에 반드시 사면안정해석을 실시하여 사면구배를 결정하여야 한다.

3. 조경분야

1) 일반 사항

(1) 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고 건물, 주차장 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물 주변환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

(2) 조경계획은 대지주변 현황 분석 및 건축물의 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

(3) 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게 공간, 수경 공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

(4) 조경은 자연지형을 이용하여 계획하여야 하고, 가능한 기존수목을 이용하도록 한다.

(5) 조경은 「태백시 건축조례」 등을 고려하여야 하고, 이용자 편의 및 친근한 이미지를 부여할 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

2) 조경 수목

(1) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

(2) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

(3) 단지 내 조경의 단조로움을 피하기 위하여 필요한 경우에는 마운딩을 조성하되 주변과 조화를 이루도록 설계하여야 한다.

(4) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 거리를 확보하여야 한다.

(5) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

3) 조경 시설물

(1) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이하여야 한다.

(2) 산책로 또는 조경포장이 있는 경우에는 투수성 및 친화적인 재료를 사용하여야 한다.

(3) 시설안내 Sign, 각종표지판, 상징적 Sign, 준공석 표지석 등의 디자인과 설치 위치는 안을 작성, 발주처와 협의하여 결정한다.

제4장  설계도서 작성요령

1. 공통사항

1) ‘건축물의 설계도서 작성기준’을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성	방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는	‘추	가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

2) 아울러, 각 과업 단계별 설계도서의 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영	하여야 한다.

2. 계획설계

아래의 계획설계 작성방법에 따라 설계공모 당선안을 기본으로 심사위원 보완의견 및       발주자의 의견을 반영한 내용으로 제출

1) 일반사항

(1) “국토교통부 고시 설계도서 작성기준”을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계	도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 “기본업무 설계도서”와 본 과업을 위해 필	요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 수급자가 제출한 보완된 계획안이 부적합하다고 발주자가 검토의견을 통보시 수급자는 조속한 시일안에 새로운 대안을 재작성하여 제출하여야 한다. 그로 인한 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

(3) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급자는 즉시 보완․제출하여 발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

2) 계획설계 수정 시의 제출 서류 (공모안에서 보완된 사항 위주)

(1) 현장조사서

(2) 설계계획 개요 작성

(3) 대지분석

- 도시축, 향, 조망분석

- 토지이용계획

- 건축가능 영역

- 차량 및 보행자 동선

(4) 주변도로망과 주차 진출입부, 내부 램프 등을 포함한 지상층 계획

(5) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

(6) 개략적인 평면 및 입면계획(입면형태는 주변과의 조화성)

(7) 조경계획

(8) 관련법규 검토서

(9) 주민설명회시 제출된 의견(부득이 반영이 필요한 의견에 한함)

2) 조사 방법

(1) 조사는 관련 문헌 및 서류조사 등과 현장조사를 병행하여야 한다.

(2) 문헌조사

- 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부등본, 조례 등 특이한 사항  을 모두 조사하여야 한다.

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는  모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

3) 현장조사(도면 작성을 위한 기본조사 외 추가 조사는 태백교육지원청과 협의후 진행

한다.)

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소  음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하  여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지전경을 촬영보관하여야 한  다.

- 주변과의 조화를 고려하여 주변 건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역난방 등의 도시기반시설  에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위 경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록  하여야 한다.(현황측량은 발주처가 제공한다.)

※ 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

4) 측량조사방법

(1) 일반사항

- 측량조사는 계획 설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을  정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

- 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관  련규정에 따라 시행한다.

- 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급자가 설계 목적상 필요한 조사사항은 그 사  유를 서면 제출하여 발주자의 승인을 득한 후 실시한다.

- 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준  으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

- 발주자가 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산할 수 있다.

- 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급자가 책  임지며, 수급자 부담으로 이를 해결하여야 한다.

- 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급자는 이를 수급자 부담으로 보완하여야  하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토  한다.

(2) 조사측량(경계측량과 현황측량은 발주처가 제공한다.)

- 경계측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 측량한다.

- 현황측량은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지 내외  의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

- 측량면적은 사업경계선으로부터 주의의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주자와 협  의 후 결정한다.

- 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능  하게 설치한다.

- 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

(3) 표시항목

- 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하 지장  물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여  야 한다.

3. 중간설계

“중간설계”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 설계 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계 도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받은 단계를 말한다.

1) 일반사항

(1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완설명서에 따라 작성한다.

(2) 계획 설계 위치를 기준으로 지질조사 계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

(3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 단위 공사별로 작성되어야 한다.

(4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준	을 제시하여야 한다.

(5) 각종 설비 설치위치는 장비 레이아웃(Lay-Out)을 작성하여 발주자의 승인을 받는다.

2) 지질조사

(1) 일반사항

- 지질조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, NX공수)와 기존 조사  내용을 첨부하여 작성 발주자와 발주자의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야   한다.

- 지질조사는 발주자가 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료 보관상자  에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한  시험은 발주자의 지시에 따라 조사를 실시하고 그 결과를 설계에 반영하며. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

- 수급자는 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적   인 수급자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주자의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한  다.

- 지질조사 시 책임기술자를 상주하여 지질조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추  조사를 하여야 한다.

(2) 조사방법

- 지질조사는 계획 설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고  려하여 지질조사를 실시함을 원칙으로 한다.

- 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고 공사   기간 중·장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 발주자의 승인을 득한  후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

- 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지   층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 연암 2.0m이상까지 조사하며,  시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시해야  한다.

- 수급자는 현장 지질조사, 현장시험 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석  하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시하여야한다

- 지하수위측정

ㆍ시추공내의 지하수위는 시추완료 후 일정시간 경과한 후 각각 측정하여 조사 지  점의 안정된 수위를 측정한다.

ㆍ지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전 기간을 통하여 수시로 측정하  여 지하수위의 변동 상태를 파악한다.

- 토질시험 및 토질조사 등

ㆍ KS F(한국산업규격)의 의한 시험 및 조사

ㆍ기타 본 사업부지(지반)의 특성을 파악할 수 실험(물리시험,역학시험,화학시험,안  정화시험,실내암석시험등) 등

- 시료상자정리: 시료상자에는 과업 명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를  표시하여 보관하여야 한다.

(3) 지질조사 성과품

- 시료보관상자(75㎝×40㎝×6㎝ 이상) 및 시료

- 보고서는 A4 규격으로 좌철(무선무사철), 시추사진 및 전경 등 첨부되는 사진은 칼  라를 사용한다.

3) 설계도서의 구성

(1) 건  축

- 설계설명서

ㆍ공사개요: 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

ㆍ설계개요: 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

ㆍ 현지조사: 국내의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과를 조사․분석․검토 내용(반영사항 표기)

ㆍ계획설계내용

ㆍ사전조사: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

ㆍ시공방법

ㆍ주요자재계획 및 기타 필요한 사항

- 구조계획서

ㆍ설계근거기준

ㆍ구조재료의 성질 및 특성

ㆍ제반 하중조건에 대한 분석

ㆍ각부 구조계획 : 골조의 평면, 간사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

ㆍ구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 시방서: 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

- 도면종류

ㆍ부근안내도: 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

ㆍ배 치 도: 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치, 기타 시공에 필요한 사항

ㆍ대지 구적도

ㆍ건축면적 산출표

ㆍ내․외부 마감표: 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕 등

ㆍ각층 평면도: 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는  사항

ㆍ입면도(정면 및 측면): 실시설계의 기준이 되는 사항

ㆍ단면도(종횡 2면 이상): 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

ㆍ각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

ㆍ주요 구조부 단면상세도

ㆍ기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

(2) 토  목(해당시)

- 설계 보고서ㆍ공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

ㆍ계획 및 방침: 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

ㆍ사전조사사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

※ 지반고는 반드시 측량을 실시하고 공사착공 시 인위적인 지반고 변경이 없음에도  도면과 상이시는 수급자 부담으로 재 측량하여야 함

ㆍ시공방법

ㆍ개략공사비 산정 및 기타 필요한 사항

- 구조 및 수리계산서

ㆍ구조계산서

ㆍ수리계산서

- 개략 설계내역서: 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

- 도면종류: 위치도, 종단면도 및 횡단면도, 평면도, 구조물도 및 부대시설도, 유역산출 면적표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

(3) 조  경(해당시)

- 설계 보고서

ㆍ공사개요: 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

ㆍ사전조사사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

ㆍ개략공사비 산정 및 기타 필요한 사항

- 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

- 도면종류

ㆍ위치도

ㆍ조경계획 평면도: 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ조경시설물 공사계획: 조형물, 파고라, 벤치, 음수대 등 조경시설물

4. 실시설계

“실시설계”라 함은 계획설계 및 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 칫수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

1) 일반 사항

(1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완설명서에 따라 작성한다.

(2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

(3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

(4) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

2) 설계도서의 구성

(1) 건축

- 설계 설명서

ㆍ공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

ㆍ설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

ㆍ사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

ㆍ세부 시공방법

ㆍ공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

ㆍ건물의 색채사용계획

ㆍ공정계획(공정표 포함)

ㆍ기타 필요한 사항

- 구조 계획서

ㆍ설계근거기준

ㆍ구조재료의 성질 및 특성

ㆍ제반 하중조건에 대한 분석

ㆍ각부 구조계획

ㆍ구조성능: 단열, 내화, 차음, 진동 등

ㆍ구조계산서

- 시방서

ㆍ당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

ㆍ특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

- 도면종류

ㆍ부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

ㆍ투시도 : 천연색채 사용

ㆍ도면 목록표

ㆍ배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

ㆍ부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

ㆍ구적도

ㆍ건축면적 산출표

ㆍ내․외부 마감: 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

ㆍ각층 평면도, 단위 평면도

ㆍ각층 천장 평면: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ지붕 평면: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ입면도(4면: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ주단면도: 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

ㆍ주단면상세: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ각실 단면상세: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ계단 평․단면상세: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

ㆍ각부 구조배근상세: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ옹벽배근: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ각부 구조단면: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ구조부재 접합상세: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ각층 기둥․보의 위치 및 일람: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ부착시설물 상세도: 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ조경계획 평면: 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

ㆍ조경시설물 공사계획: 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판류 등

ㆍ건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

ㆍ기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척: 1/50 정도)를 작성하여야 한다.

- 공사비산출: 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

(2) 토목

- 설계 보고서

ㆍ공사개요: 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

ㆍ계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

ㆍ사전조사사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

ㆍ세부시공계획/자재사용계획/세부공정계획

ㆍ세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

ㆍ구조 및 수리계산서

- 시방서

- 도면 종류

ㆍ위치도

ㆍ종단면도 및 횡단면도

ㆍ평면도

ㆍ구조물도, 부대시설도 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

(3) 조경(해당시)

- 설계 보고서

ㆍ공사개요: 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

ㆍ사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

ㆍ세부시공계획/자재사용계획/세부공정계획

ㆍ세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

- 시방서

- 도면 종류

ㆍ배치도, 종단면도 및 횡단면도

ㆍ평면도

ㆍ조경시설물 배치도

ㆍ기타 시공에 필요한 사항 일체

- 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

제5장  성과품의 작성 및 납품

1. 일반사항

설계자는 성과품을 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 다음 사항을 유의하여 작성한다.

1) 예비검사

설계자는 설계용역 준공예정일 15일전에 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고 1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정       하여야 한다.

2) 작성기준

설계자는 본 과업내용 및 아래 기준과 국토교통부 고시「공공발주사업에 대한 건축  사의 업무범위와 대가기준」,「건설공사의 설계도서 작성기준」에 의거 성과품을 작  성하여 제출한다.

(1) KS A 0005 제도통칙

(2) KS F 1501 건축제도통칙

(3) KS F 1001 토목제도통칙

3) 설계도서 검토

(1) 검토 방법

① 설계시행 책임기술자가 검토

② 먼저 각종계산서 확인 검토

③ 확인된 계산서와 도면 일치여부 검토

(2) 제출도면

검토 및 수정완료 후 도면상에 검토자 소속, 직, 성명 기재 및 서명하고 수정 완료된 설계도서 및 검토도면 1부 제출

(3) 제출시기 : 중간검토 및 준공 시 제출

4) 유의사항

(1) 내역서 작성은 최종 설계도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 물량 등의 착오가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(2) 엔지니어링산업 진흥법 제27조(설계도서의 등의 서명날인) 및 건설기술진흥법 시행규칙 제43조(설계도서 작성 참여 기술자의 업무 수행내용 명기)에따라 모든 설계 참여자(사업책임자, 분야별 책임자, 설계자)는 설계도면 및보고서에 서명 날인할 것

(3) 모든 도면은 CAD System을 이용하여 작성하되 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정 제66조에 따라 단체표준으로 공고된 건설 CALS/EC 전자도면 작성표준에 따라 작성한다.

(4) 설계자는 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄는 발주자와 협의 후 실시하여야 하며 발주기관의 요구에 따라 제출하여야 한다.

(5) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(6) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(7) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한크기의 용지를 사용할 수 있다.

(8) 성과품 작성 시 서술원칙

a. 문장내용은 간단명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

b. 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

c. 불가능한 사항은 규정하지 말 것

d. 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

e. 정확한 문법으로 기재할 것

f. 예측보다는 직설적으로 서술할 것

g. 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

h. 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

i. 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

j. KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

(9) 가설구조물 설계도서 : 구조검토를 통해 가설구조물 설계도서 작성 및 구조검토서를 첨부하고 가설구조물 부문별 설계변경이 가능하도록 설계도서(설계물량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확하게 작성한다.

(10) 최종용역보고서에 용역손해배상 보험·공제증권을 수록 할 것.

2. 성과품의 작성

1) 설계보고서

(1) 표 지

(2) 제출문(용역수행업체의 대표이사 명의)

(3) 참여기술자(명단, 생년월일, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명)

(4) 목 차

(5) 위치도

(6) 과업의 목적

(7) 과업의 개요(내용), 과업수행 지침

(8) 조사 및 분석(현지답사, 수리·수문조사, 측량, 지장물조사, 지반조사 및 토질시험, 교통량 및 교통시설조사, 토취장, 골재원, 사토장조사, 용지조사, 관련계획 자료조사, 환경영향조사, 소음·진동조사, 구조물조사, 동일 또는 유사 공종의 건설공사 사후평가 결과조사, 기타조사)

(9) 설계기준

(10) 관련계획 검토사항

(11) 기본설계 내용검토

(12) 실시설계 내용

(13) 실시설계 사후평가표(건설공사 사후평가 시행지침의 별표 1)

사업명	실시설계				공사비 증가시 재검증		사업수행성과
	용역비 (백만원)	수행기간	추정 공사비 (백만원)	추정 공사기간	실시여부 (○, ×)	미실시 사유	실시 설계비 증감율	실시 설계기간 증감율	공사비 증감율	공사기간 증감율	비고
		년월일 〜 년월일		○년 ○개월							상세하게 작성

(14) 시공 및 유지관리 시설계획(공사 공정예정표, 시공순서, 시공방법, 공사중

교통처리, 지장물이설, 유지관리시설)

※ 공사예정공정표 : 우기·동절기 등 공사 중지 기간 및 출퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증으로 인한 시민불편 유발 여부 등을 충분히 고려하고 시공전문가 참여하여 적정 공사기간 산정

(15) 부록(각종 조사자료, 설계자문회의 결과 및 지적사항 조치와 설계반영 내용, 주요	설계도면 협의 및 지시사항, 주요자재 및 공법 선정․비교 반영 내용 등)

(16) 설계실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 공공기 관의 개인정보에 관한 법률 제9조에 따라 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

(17) 시공상세도 작성지침에 따라 시공상세도 작성목록을 제시하여야 하며, 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시해야 함

(18) 시공상세도 작성비용은 엔지니어링 사업대가 기준에 따라 산정하여 포함하여야 한다.

(19) 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와는 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용)를 계상한다.

(20) 안전관리비를 잠정금액(Provisional Sum, PS단가)으로 설계내역서에 포함하여작성

(21) 기타 발주기관 요구사항

2) 설계 설명서

(1) 공통분야 : 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용  및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.

(2) 건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결   정, 평면․입면․주요 단면 선정, 구조․부대시설 등 기본방식 결정, 친환경  설계내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 차량, 보행자 동선등에  관한 동선계획

(3) 토목분야 : 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 기초공법검  토, 골재원 및 사토장 선정, 배수처리계획(공사중 계획 포함), 신기술.  신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가

(4) 조경분야 : 식재 및 시설물 계획, 옥상조경계획, 수목이식계획, 세부공정계획, 세부  공사비, 유지관리계획 등

3) 각종 계산서

(1) 시설물별 내진설계 기준에 따라 내진설계 내용을 명시한다(지진재해대책법제14조)

(2) 해당 건축물 내 구조계산서(건축,토목), 에너지 절약계획서등을 포함한다.

(3) 물량산출서

① 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

② 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출한다.

(4) 구조계산서

① 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토

가 용이하게 작성되어야 한다. 특히 프로그램의 입․출력 자료는 모든 Case별로 이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

② 각종 계산에 사용한 전산 프로그램명과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 기재한다.

③ 전산프로그램을 사용하여 계산한 경우, 구조계산서에는 정확한 모든(Case별) 입력자료가 정리되어야 한다. 또한 그에 대한 출력자료 역시 정리되어 있어야 한다. (B.M.D, S.F.D 등)

④ 모든 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록 별책 작성한다. 그 양이 과대한 경우에는 별책으로 작성하여 최소 소요 부수만 제출한다. 그러나 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주기관과 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

⑤ 구조계산 시 주요 설계계수가 가정 값인 경우에는 반드시 가정값임을 명시하도록 한다.

⑥ 공공건축물 내진 성능 향상을 위해 구조안전 및 내진설계 확인서에 건축

구조기술사가 확인/날인하여 설계완료시 제출한다.

⑦ 흙막이 시설물 및 가시설물(비계, 동바리 등)에 대한 구조계산서를 설계완료시 제출한다.

4) 설계도면

(1) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

(2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한  다.

(3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

(4) 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도,주요설계조건, 품질보장 혹은 구조적으로 지켜야 할 사항과 시공시 도면이해를 의한 주기사항 및 특수시공이 강조되는 경우 시공 시에 유의하여야 할 사항 등에 대한 도면 시방 및 특기사항을 해당도면에 명기한다.

(5) 주요 설계계수가 가정 값인 경우 현장시공에 앞서 확인이 필요하면 도면 주석란에 이러한 사실을 명시하여야 한다.

(6) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들 번호 및 도면명을 표기한다.

(7) 구조물 도면 우측상단에는 설계방법(허용응력설계법 또는 강도설계법), 재료의 종류, 강도 등에 대하여 표시하여야 한다.

(8) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

(9) 설계도면에 개정(Revision)란을 만들어 도면의 History를 기록한다.

(10) 도면하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

(11) 설계도면에 작성되는 단위는 SI, MKS단위를 사용하며, 발주기관과 협의 한 후 사용한다.

(12) 모든 도면은 CAD SYSTEM을 이용하여 작성하고 그 결과를 CD(DVD)에 담아 제출 한다(각 파일은 캐드 파일과 일반 범용 그래픽 파일로 변환된 파일을 함께 구분하여 제출한다)

(13) 인근주변 피해방지 등을 위한 안전시설 등을 제출한다.

5) 유지관리지침서 등 작성

(1) 건물 준공 후 유지관리에 필요한 유지관리지침서를 각 분야별로 상세하게 작성한다.

※ 건물 구조검토시 반영한 고정하중 및 활하중이 표기된 하중평면도 포함

(2) 유지관리에 필요한 비용, 인력, 장비, 방법 등이 포함되어야 한다.

6) 공사시방서

(1) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정 한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

(2) 공사시방서는 표준시방서를 기준으로 작성하되 전문시방서 공종분류 체계에 맞게 작성하고, 자재․입찰절차․ 공사비․공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 전문시방서 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성한다.

(3) 공사시방서(건설공사의 계약도서에 포함된 시공기준)는 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 기본설계 및 실시설계 도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능·규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술한다.

(4) 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서  에 명시하여야 한다.

(5) 시공상세도 작성비용은 엔지니어링 사업대가 기준에 따라 산정하여 공사 예산서에 반영하여야 한다.

(6) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되도록 한다.

① 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등

에 관한 상세사항

② 해당 건설공사 표준시방서, 관련법규 및 지침 등 제 기준의 명칭

③ 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

④ 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

⑤ 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사	항

⑥ 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에	관한 세부사항

⑦ 발주자와 시공자 사이의 책임범위 및 한계

⑧ 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

⑨ 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

⑩ 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비,	소요인원 등에 대한 상세한 규정

⑪ 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

⑫ 시공자가 건설공사의 진행단계별로 작성할 시공상세도면의 목록

⑬ 기타 주요공사 사항

(7) 공사시방서 작성 시 유의사항

① 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

② 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

③ 표준양식을 사용하도록 하고, 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한	다.

④ 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

⑤ 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

⑥ 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

⑦ 공사기성에 관련된 사항은 이해가 명확하도록 한다.

⑧ 발주자의 의도를 정확히 파악하고, 발주자의 감독, 설계자, 감리자 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

⑨ 사용자재에 있어서는 독과점 품목인 경우를 제외하고는 제조회사의 고

유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

⑩ 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성한다.

⑪ 본 공사와 관계없는 공종의 시방서가 포함되지 않도록 한다.

7) 설계예산서(공사내역서)

(1) 공사비는 시공상세도면 작성, 철거공사, 석면조사․철거 및 부가가치세를 포함하며, 부득이 발주자가 제시하는 공사금액 이상인경우 별도 협의하여 공사비를 결정하여야 한다.

(2) 공사비에는 지장물 이설비, 필요시 에너지 인입 공사비 및 철거 가시설 및 안전관련시설, 석면제거(해당시), 폐기물처리비(100톤이상시 별도 작성) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

(3) 설계예산서는 다음의 각 호 내용을 수록하며, 설계설명서, 설계내역서, 단가산출서, 수량산출서로 구별하고 단가산출서는 별책으로 작성한다.

① 설계서의 표지

② 설계설명서 (공사목적, 개요, 위치, 기간, 규모, 물량, 관급자재 등)

③ 공사예정공정표

④ 설계내역총괄 (설계예산, 도급공사, 원가계산서, 총괄내역, 공종별 내역서,	일위대가 등)

⑤ 설계내역서 (도급비, 사급비, 이전비, 기타)

⑥ 일위대가표 (단가산출근거, 중기사용료, 단가조서, 견적서, 운반거리, 조견	표등)

(4) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

(5) 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

① 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 시행규칙

② 지방재정법 및 동법 시행령, 재무회계예규

③ 기타 관련법규 및 기준

(6) 공사비 내역서는 국토교통부 ‘건설공사 실적공사비 적용 공종 및 단가’를 협의하여 적용하고 ‘행정자치부 지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령’ 및 ‘건설공사 표준안전관리비 계상기준’ 및 사용기준과 건설기술진흥법에 의한 ‘안전관리비 계상기준 및 사용기준’에 의하여 산출한다.

① 재료비

a. 조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보 게재 가격)으로 한다.

b. 조달청 조달정보에 미 수록된 자재는 재정경제부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

c. 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다. 단 그러하지 못할 경우에는 그 타당한 사유를 기재하여야 한다.

② 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

③ 중기손료 작성 시의 외환환율은 당해 년도 금융결재원이 외국환은행장 등에게 통보하는 기준환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을기준으로 하나 외환환율의 변동이 클 경우는 발주기관과 협의 후 결정한다.

④ 유류가는 산업통산자원부 고시가격 등으로 발주기관과 협의하여야 한다.

⑤ 운반비는 목적지, 운반장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

⑥ 산업안전보건법에 의한 산업안전보건관리비 및 건설기술진흥법에 의한 안전관리비를 별도로 계상하여야 한다.

(7) 공사비 산출을 위한 견적서는 3개 업체 이상의 것을 기준으로 하되, 부득이한 경우에는 발주기관과 협의하여 1개 또는 2개 업체의 견적서를 기준한다. 단, 견적가가 사회통념과 상당한 차이가 있다고 판단될 때에는 시장조사 등을 실시하여 설계하여야 한다.

(8) 각 품목별 단가는 품명규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

(9) 품셈은 당해 연도「건설공사 표준품셈」에 준한다.

(10) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

(11) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

(12) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록한다.

(13) 복합단가의 산출은 일위 대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

(14) 공사내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 참조 발주자와 협의하여 적용하여야 한다.

8) 예정공정표

(1) 예정공정표는 PERT- CPM 기법으로 작성하고, 별도로 A3 규격으로 축소하여 대표자 날인 후 제출한다.

(2) 예정공정표는 우기·동절기 등 공사 중지 기간, 예산투입계획, 안전사고 예방 등을 충분히 고려하고, 출·퇴근 시간대 공사로 인한 교통체증 등으로 시민불편이 유발되지 않도록 공정관리 전문가 참여하에 적정한 공사기간을 산정한다.

9) 지장물 조서 및 인․허가 도서

(1) 지장물 조서 작성

① 지장물은 발주자와 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

② 과업시행으로 인하여 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)	하여 기재한다.

(2) 인․허가 도서

관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 협의완료 도서를 제출한다.

10) 색채디자인 및 CI 계획

(1) 현판, 현관 안내판(장애인점자 포함), 장애인시설물 사인, 주차장안내, 채널사인, 전면간판, 층별 안내, 돌출사인 등의 디자인 개념을 제시하고 태백교육지원청이 전문 업체 에 발주시 채색시안 및 설치 위치등 긴밀히 협조하여야 한다.

11) 기타

(1) 수량산출서 작성시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

(2) 도면의 크기는 KSA5201의 A0～A6에 준하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 도면, 집계표 등을 위해 A3 크기 또는 적절한 크기의 용지를 사용할 수 있다.

3. 성과품의 납품

1) 성과품 납품시기

(1) 성과품의 납품은 계획 설계(검토협의), 기본(중간)설계 납품, 실시 설계도면 납품, 실시설계 최종납품으로 구분하며, 구체적인 납품일은 발주자와 협의하여 결정한다.

① 계획설계(검토협의) : 착수일로부터 30일 이내

② 중간설계(기본설계) 납품 : 착수일로부터 90일 이내

③ 실시설계 최종납품 : 착수일로부터 180일 이내

2) 성과품 종류 및 납품부수

(1) 계획설계 성과품의 종류 및 납품부수

① 계획서 및 계획설계 도서 등 - 2부

a. 법규검토, 건축·구조 계획서, 토목·조경계획서, 공사비계산서

b. 계획설계 자문용 도면(발주자와 협의후 결정), 계획설계 납품도서 등

(2) 중간설계 성과품의 종류 및 납품부수

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	설계설명서	A4	2	부
2	기본설계보고서(지반보고서 포함)	A4	2	부
3	구조계산서	A4	2	부
4	설계계산서	A4	2	부
5	기본설계 도면(A3 반책)	A4	2	부

(3) 실시설계 성과품의 종류 및 납품부수

종류	규 격	부 수	비고
설계도면 (A3반책)	A4	5	※ 공종분야별 구분 등에 대하여는 태백교육지원청과 협의하여 제출한다 . ※ 예산내역서는 XML 파 일로도 제출한다. ※ 모든 성과품은 디지털화 하여 usb로 제출한다. ※ 납품도서 부수는 발주 자가 추가 요청 할 수 있다
출 력 도면 및 성과품 file(dwg 및 PDF file)	USB	3
설계설명서	A4	5
공사시방서	A4	각 5
구조계산서(내진설계 포함) 및 지하 흙막이 시설물 및 가시설물(비계, 동바리 등)에 대한 구조계산서, 구조검토서 등	A4	각 5
예산내역서	A4	5
일위대가표	A4	5
단가산출조서	A4	5
수량산출조서	A4	5
각종설계계산서(에너지절약계획서 포함-해당시)	A4	5
구조안전 및 내진설계 확인서 및 내진설계 체크리스트	A4	3
각종 설계기준 및 자료(인증관련 포함)	A4	3
조감도(채색)	70㎝×50㎝	2
자재내역	A4	2
공사 예정공정표	A3	2
기타 관계부서 협의용 도서	-	소요량
자문, 심의, 심사, 협의 등 결과 반영보고서	-	소요량

□ 분야별 최종성과품 납품 확인자

○ 건축담당 :                       (서명)

○ 토목담당 :                       (서명)

○ 조경담당 :                       (서명)

※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출한다

ㅇ 설계도면(도면목록화일 및 한글폰트화일 포함)과 시방서는 USB에 종합하여 제출하여야한다.

ㅇ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함) CD-ROM 및 USB는 우리 시 계약심사를 위한

XML 파일로 전환하여 오류가 없음을 반드시 확인한 후 제출하고, 사용프로그램에 대

하여는 발주자와 수시 협의한다.

ㅇ 실시설계 납품 시 설계내역전산파일은 조달청이 선정한 프로그램으로「조달청 공사원가

호환규정 및 코드」에 따라 작성되고 「호환규정검증프로그램」에서 오류가 없음이

확인된 설계내역전산파일(XML)로 제출하여야 함.

ㅇ 내역서 작성요령은 조달청에서 통보한 “건축공사 계약요청시 설계도서 작성요령”을

준용하여 태백교육지원청과 수시 협의한다.

[붙임 1] 착수계

착  수  계

감독관 경유

1. 용  역  명 : 한국항공고등학교 기숙사 증축공사 설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일 (착수일로부터 ○○○일)

본 업체는 상기 용역에 대한 착수계를 제출합니다.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 2] 사용인감계

사  용  인  감  계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인이 사용하는 인감으로서 태백교육지원청에서 시행하는 「한국항공고등학교 기숙사 증축공사 설계용역」 설계공모에 대한 입찰·계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하겠으며, 위 인감 사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용 인감계를 제출합니다.

첨부  인감증명서 1부.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 3] 책임기술자 선임계

책임기술자 선임계

1. 용  역  명  : 한국항공고등학교 기숙사 증축공사 설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일

- 아          래 -

가. 성             명 :

나. 주             소 :

다. 주 민 등 록 번 호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며, 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임  1. 자격(면허)증 사본 1부.

2. 재직증명서 1부.

3. 경력증명서 1부.

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 4] 참여기술자 현황

참여기술자 현황

연 번	분 야	직 위	자격종목 및 등록번호	주민등록번호	성 명	비 고
1				예)881212-1******
2
3
4
5
6
7
8
9
10

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 5] 분야별 책임기술자 선임계

분야별 책임기술자 선임계

1. 용  역  명  : 한국항공고등학교 기숙사 증축공사 설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일

- 아          래 -

가. 기   술    분   야 :

나. 성              명 :

다. 주              소 :

라. 주 민 등 록 번 호 :

마. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 ○○분야에 대한 책임기술자로 선임하여 제출합니다.

붙임  1. 자격(면허)증 사본 1부.

2. 재직증명서 1부.

3. 경력증명서 1부.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 6] 공동수급표준협정서(분담이행방식)

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제7장 공동계약 운영요령 제3절 7. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용)

① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 종합건설공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 토목공사

나) ○○○건설회사 : 건축공사

2. 환경설비설치공사의 경우

가) ○○○건설회사 : 설비설치공사

나) ○○○제조회사 : 설비제작

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임)

① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치)

① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회)

① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년   월   일

공동수급 대표자 :           (인)

공동수급 응모자 :           (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 7] 참여기술자 각서인

참여기술자 각서인

성 명	주민등록번호	주 소	날 인
	예)881212-1******

[붙임 8] 하도급 승인요청서

하도급 승인요청서

1. 용  역  명 : 한국항공고등학교 기숙사 증축공사 설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일

- 아          래 -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 적산 등)

나. 하도급금액 :

다. 하 도 급 자

1) 주    소 :

2) 상    호 :

3) 대 표 자 :

4) 보유면허 :

상기인에게 본 설계용역의 ○○분야를 하도급 하고자,「지방자치단체용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건」제5조(하도급 승인)에 따라 승인요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 1부.

2. 하도급계약서 사본 1부.

3. 참여기술자 명단(기술자격증, 경력증명서 및 재직증명서 포함) 1부.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 9] 보안각서

보  안  각  서

1. 용  역  명  : 한국항공고등학교 기숙사 증축공사 설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

가. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

나. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을「용역계약일반조건」제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

다. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인해 발주청에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는「건축사법」제20조(업무상의 성실의무 등)에 의한 손해배상 책임을 지고 처벌되어도 일체 이의를 제기하지 않는다.

붙임  참여기술자 각서인 1부.

2025년   월   일

주민등록번호 :

기 술  분 야 :

대   표   자 :           (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 10] (중간, 실시) 설계 검사원

(중간, 실시) 설계 검사원

1. 용  역  명 : 한국항공고등학교 기숙사 증축공사 설계용역

2. 계 약 금 액 : ○○○원(금○○○원)

3. 계 약 일 자 : 2025년   월   일

4. 착 수 일 자 : 2025년   월   일

5. 완료 예정일 : 2025년   월   일

본 용역의 (중간, 실시) 설계 완료에 따라 검사원을 제출하오니

검사하여 주시기 바랍니다.

붙  임  납품설계도서 1식.

2025년   월   일

계약자  상    호 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 11] 주간 공정보고

주간 공정보고

1. 용  역  명 : 한국항공고등학교 기숙사 증축공사 설계용역

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 :

다. 계약금액 :

3. 용역진행사항

구 분	전주 진행사항(`24. . .)	금주 예정사항(`24. . .)	진행률(%)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축(전시), 토목, 조경, 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

2025년   월   일

책임기술자 :           (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 12] 월간 공정보고

월간 공정보고

1. 용  역  명 : 한국항공고등학교 기숙사 증축공사 설계용역

2. 용 역 개 요

가. 현장위치 :

나. 용역기간 :

다. 계약금액 :

3. 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (2025. . . ～ 2025. . .)	비 고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

2025년   월   일

책임기술자 :           (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하

[붙임 13] 협력기술자 보고

관계전문기술 협력기술자 명단

ㅇ 용 역 명 :

ㅇ 용역기간 :

ㅇ 용역회사 :

ㅇ 용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자 (설계사,감리사)					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격증번호

[붙임 14] 설계용역자문 참여기술자 명단

설계용역자문 참여기술자 명단

(회사대표, 책임․분야별․참여기술자 등)

구 분	분 야 별		성 명	서 명
설계사 (기술사)	회사명	ㅇㅇ건축사사무소 ㅇㅇ엔지니어링
	참여기술자	사업책임기술자 분야별책임기술자

주      소 :

상      호 :

대  표  자 :

책임기술자 :                            (인)

강원특별자치도태백교육지원청 교육장 귀하