「향토음식진흥센터 조성 공사 기본 및 실시설계 용역」

과 업 지 시 서

2025. 2.

목 차 - 1

Ⅰ 과업개요	1

1. 추진배경 및 과업목적	1

2. 과업의 개요	1

3. 과업의 범위	2

4. 주요업무의 협조, 승인 및 시정요청	3

5. 인허가업무	3

6. 설계의도구현	4

7. 과업진행 중 설계변경사항의 반영	4

Ⅱ 과업진행단계	5

1. 공통사항	5

2. 과업의 진행단계	9

3. 과업의 주요업무	16

Ⅲ 과업수행지침	30

1. 법령 등의 적용기준	30

2. 설계일반지침	31

3. 설계기본방향	36

4. 설계주요지침	37

5. 기타 설계지침	46

6. 단계별 도서제출	47

7. 설계도서의 분리작성	48

8. 설계도서 표기	48

9. 도면작성	49

10. 관계기관 업무협의	49

목 차 - 2

Ⅲ 설계도서의 작성	50

1. 공통사항	50

2. 계획설계	51

3. 중간설계	52

4. 실시설계	57

Ⅳ 단계별 설계도서 제출목록	65

1. 계획설계 제출도서	65

2. 중간설계 제출도서	66

3. 실시설계 제출도서	67

Ⅴ 서식	70

Ⅰ		과업의 개요

1. 추진배경 및 과업목적

ㅇ 추진배경 : 한식 원형 연구 및 고유성 보존 등 향토음식 기반 전방 산업 육성을 위한 향토음식진흥센터 설립 추진

ㅇ 과업목적 : 향토음식진흥센터의 기능·인원·규모·부지·구축비 등을 고려한 최적 기본 및 실시 설계안 마련

2. 과업의 개요

가. 과 업 명 : 향토음식진흥센터 조성 공사 기본 및 실시설계 용역

나. 대지위치 : 전라남도 목포시 항동 2-4 / 대지면적 : 978.50㎡

다. 지역/지구 : 도시지역, 일반상업지역, 제1종일반주거지역, 고도지구(10층(30m)이하), 역사문화환경보전지역

라. 건축규모

1) 주요시설(용도) : 문화 및 집회시설

2) 연면적 : 1,370㎡

3) 층수기준 : 층수(지상‧지하) 및 규모 등은 설계자가 총공사비 범위 내(4층 이하)에서 공간구성 활용 방안 등 자유롭게 계획·제안

4) 시설별 면적기준 (참고)

시설용도	면적(㎡)
문화 및 집회시설	1,370
공용면적(홀, 계단, 화장실 등) 350㎡	350
상설전시관 154㎡ / 기획전시관 44㎡ / 이벤트홀 35㎡	233
조리체험실 183㎡ / 강사대기실 15.5㎡ / 재료준비실 23.5㎡ / 저장창고 12.5㎡ / 육아휴게실(수유실) 9.5㎡	244
사무연구 118㎡ / 소회의실 26㎡ / 문서고 창고 25㎡ / 휴게 탕비실 21㎡ / 당직실 10㎡ / 기계실 43㎡ / 서버장비실 55㎡	298
교육세미나실 및 아카이브(기록보관) 245㎡	245

※ 상기 층별 프로그램 배치 및 면적은 참고용으로 공사비 예산 범위 내에서 건축 규모에 맞는 운영 프로그램을 설계자의 계획에 의하여 제안(조정) 가능(*단, 오차범위는 연면적 허용범위 ±3%, 실별 면적 ±10% 이하)

마. 설계(용역)기간 : 계약일로부터 ~ 2025년 11월 (착수일로부터 210일 이내)

- 기본 및 실시설계기간으로 인‧허가, 각종 인증취득 등 행정절차 기간 포함

- 단, 발주기관의 요구로 추가용역발생이나 기타 설계자의 귀책사유가 아닌 설계기간의 연장이 필요할 시는 기간 연장을 할 수 있다.

바. 설계용역비 : 501,330,000원 (VAT, 손배료 및 각종 인증용역비 포함 / 인증수수료 제외)

※ 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.

(용역계약 일반조건 등 참조)

사. 예정건축공사비 : 7,710,970,000원 (부가세 포함)

※ 예정건축공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 관급자재, 폐기물처리 등에 대한 총 공사비이며, 전기·가스·수도·우·오수 등 인입비 및 분담금, 각종 검사 수수료 등 제반 비용이 포함된 금액

(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용은 변경될 수 있습니다.)

3. 과업의 범위

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계 (가설계획 등 포함)로 구성되며 관계기관과의 사전협의 및 각종 인·허가에 필요한 서류작성 및 제출, 현장에 의한 철거도서 작성 및 수량산출 (필요 시), 폐기물처리 내역서 작성, 연면적 증가 시 면적 승인 및 시설비 증액 협의에 필요한 모든 업무를 포함한다.

1) 계획·중간·실시설계 각 단계별 설계공정 계획을 수립하여야 한다.

2) 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목 등 제반분야 일체의 비용 및 각종 인증, 예비인증(에너지효율등급, 제로에너지건축물, 장애물 없는 생활환경) 업무비용 및 필요 추가업무 비용(추가적인 지장물 또는 지반조사, 에너지절약계획서 검토 수수료 등) 대가를 포함한다.

3) 설계용역 성과물은 제반 인허가 및 각종 심의, 인증을 득한 성과물이어야 한다.(각종 예비인증 취득 시 예비인증 완료일정 및 건축허가 일정은 추후 협의 후 조정할 수 있음)

나. 사업추진 및 각종 위원회 자문·심의, 영향평가 등에 대한 업무협조 및 지원을 한다.

※ 본 과업이 완료된 후에도 이에 따른 서류보완이 필요한 경우, 발주기관의 요청에 적극 협조하여야 한다.

다. 설계도서작성(설계설명서, 조감도, 공사용 도면, 시방서, 구조계산서 및 공종별 각종 계산서, 일위대가, 산출서, 내역서, 예정공정표 등 기타 공사에 필요한 서류)

라. 업무협의, 공정보고 및 기타 설계보고회 등에 대한 업무수행

마. 건축협의와 관련된 도서작성 및 업무대행

바. 기술자문위원회 심의, 건축협의 등 각종 심의에 필요한 조감도 및 투시도 등 서류작성 및 업무대행

사. 인·허가 업무 : 본 용역의 시행에 필요한 일체의 관할 행정관청 인·허가는 발주기관의 협조 하에 계약상대자가 대행

아. 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」, 「장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙」, 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙」 등에 따른 에너지효율등급, 제로에너지건축물, BF(장애물 없는 생활환경) “예비인증” 취득

자. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 공급 의무화에 필요한 제반사항

차. 「건술기술진흥법」 제62조 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」에 따른 서류 작성 및 업무대행

카. 「건축기본법」 및 「공공부문 건축디자인 업무기준」 등에 의한 민간전문가 제도(총괄·공공 건축가) 운영에 따른 협조 (*자체 전문가 자문위원 구성)

타. 「건축서비스산업 진흥법」 제22조 및 같은법 시행령 제19조에 따른 설계의도구현업무 협조

파. 기타 본 과업지시서 에서 정하는 사항 및 당해 사업 수행에 있어 필요하다고 인정되어 발주처가 요구하는 사항

4. 주요업무의 협조, 승인 및 시정요청

가. 발주기관의 용역감독자는 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조한다.

1) 기술인력 동원 현황

2) 용역단계별 과업추진내용 및 공정현황

3) 기타 확인에 필요한 사항

나. 발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 용역감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

다. 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 사전협의 후 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 발주기관 또는 관계기관과의 협의 후 추가사항, 변경사항 또는 요구사항

3) 기타 용역감독자의 지시나 발주기관의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

라. 계약상대자는 필요시 다음 제반서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

1) 용역 기성부분 검사원

2) 용역 준공기한 연기원

3) 용역 준공 검사원

마. 계약상대자는 용역감독자가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

1) 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역 업무를 지연시킬 때

5. 인․허가업무

가. 계약상대자는 용역 착수 후 현장을 답사하고, 해당 인·허가 관청을 방문 협의하여 관련 법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석해 본 과업의 건축허가 및 취득 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 발주기관에 제출한다.

※ 관계법령에 의한 각종 심의 및 인/허가 등에 필요한 제반사항

나. 계약상대자는 본 과업의 각종 영향평가, 심의, 인·허가와 관련된 용역의 필요여부를 확인하고, 해당 용역업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조하여야 한다.

1) 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

2) 각종 영향평가, 심의, 인허가의 협의조건을 반영하여 설계도서 작성

다. 계약상대자는 본 용역이 완료된 후, 인·허가 (협의사항) 관련 서류보완 등에 대하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조한다.

라. 발주기관은 계약상대자가 요청하는 인·허가 (협의사항)에 필요한 서류업무에 적극 협조한다.

6. 설계의도구현

가. 과업기간 : 설계완료 이후부터  공사 준공시점까지

나. 주요내용 : 건축설계가 완료된 후 공사시공 과정에서 건축사의 설계의도가 충분히 반영 되도록 설계도서의 해석, 자문, 현장여건 변화 및 업체선정에 따른 자재와 장비의 치수·위치·재질·질감·색상 등의 선정 및 변경에 대한 검토·보완 등을 위하여 수행하는 설계업무

7. 과업진행 중 설계변경사항의 반영

가. 설계공모 심사위원 의견 반영

1) 계약상대자는 설계공모심사 시 심사위원의 의견이 설계에 반영 될 수 있도록 최대한 노력한다.

2) 계약당사자는 설계공모 심사위원 의견에 대해 설계단계별 반영계획서를 작성하여 착수 시에 발주기관에 제출하고 협의하여 최종반영여부를 결정한다.

3) 계획, 중간, 실시설계단계 설계도서 납품 시에 조치결과 보고서를 첨부한다.

나. 단계별 설계변경사항의 반영

1) 계약상대자는 과업단계별로 발생할 수 있는 설계변경사항을 최소화하고, 발생한 설계변경사항에 대해 최적의 대안을 제시하여야 한다.

2) 행정절차, 설계적정성검토, 발주기관의 요구 등에 의한 설계변경사항이 발생하면, 계약상대자는 과업지시서의 업무진행지침에 따라 발주기관의 승인을 받아야 한다.

3) 계약상대자는 설계에 반영되어야 하는 설계변경이 예상 공사비의 증액요인이 되지 않도록 반드시 사전에 검토하여야 한다.

다. 변경공사 반영 및 사용승인 관리 설계 등

1) 공사 중 현장의 여건이나 불가피한 변경 등으로 인해 실시설계 내용과 상이하게 시공이 되는 경우, 변경공사의 내용을 사용승인 시까지 반영을 고려하고 준공 후 건축물대장의 완성 단계에 이르기까지 업무가 반영되도록 협조하여야 하며, 추가된 과업에 대해 시공자로 하여금 상호 협의하여 그 대가를 별도 산정·지급한다.

2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 천재지변으로 과업수행에 차질이 있을 때

나) 발주기관의 계획변경 등 방침에 따라 본 과업중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

다) 당초 과업수행에서 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

라) 기타 과업과 관련된 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생하였을 때

Ⅱ		과업진행단계

1. 공통사항

가. 업무기준

1) 본 과업은 한식진흥원 향토음식진흥센터 조성 공사 설계용역을 수행함에 있어 한식 진흥원과 설계용역업체 간 체결한 용역에 적용 한다

2) 과업수행은 본 과업지시서에 의하되 세부사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

3) 본 과업지시서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이   불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주처와 상호 협의하여 결정한다.

나. 계약상대자의 의무

1) 계약상대자는 본 과업지시서와 해당되는 관계법령에 따라 신의성실의 자세로서 과업을 수행하고, 설계진행 시 주요한 문제점이 발견되는 경우 발주처와 협의하여 최적의 해결방안을 반영하여야 한다.

2) 설계도서 작성 전 과업지시서를 충분히 숙지 한 후 해당부분을 참고하되 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기설비, 정보통신설비, 소방설비 등 공종별로 분리하여 설계도서를 작성하며 세부 설계내용이 서로 상충되지 않도록 한다.

3) 계약상대자는 발주기관의 승인 없이 과업의 범위·내용 등을 임의로 변경할 수 없고, 대안을 제시하고자하는 경우 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, 발주기관의 승인을 얻은 후 채택될 수 있다.

4) 계약상대자는 본 용역 수행 중 설계용역 및 건축 등과 관련하여 타 행정기관 또는 타 업체로부터 협조요청을 받을 경우, 사전에 발주처 승인을 받아 협조에 응하여야 한다.

5) 계약상대자는 본 과업수행을 위하여 각 분야별 기술자가 주요시설을 조사하여 설계에 충분한 기초자료 수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임하도록 하되, 조사계획 등에 대하여는 발주처와 사전협의를 거쳐 추진하여야 하며, 조사 후 시설현황 조사사항의 비교분석 결과 등을 보고서로 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

6) 과업수행 과정에서 필요 시 발주처 자문위원회 등의 자문을 거쳐야 하며, 지적·보완사항이 있을 경우에는 발주처와 상호 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

7) 계약상대자는 본 용역 과업수행 중 발주기관의 요구가 있거나, 또는 기성검사를 원할 경우에는 기진행된 용역을 중간 검토할 수 있도록 하여야 하며, 미진한 부분의 경우 설계자는 시정한 후 다음 단계의 설계를 진행하여야 한다.

8) 발주기관의 승인을 받은 설계도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 발생한 하자에 대해서는 계약상대자에 책임이 있으며, 또한 설계용역 완료 후에도 이러한 사항에 대해 발주기관의 수정·보완요구가 있을 경우 계약상대자 부담으로 시정·조치하여야 한다.

9) 계약상대자가 발주기관의 용역감독자에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 계약상대자가 서면을 통해서만 그 효력이 발생한다.

10) 용역 착수 시 인·허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성한 후 발주기관에 제출함으로써 업무 범위를 명확히 하고, 발주기관의 협조를 받아 필요한 도서를 작성함과 동시에 인·허가(협의)를 받을 수 있도록 해야 한다.

11) 용역(과업) 수행자의 교체

가) 과업의 수행을 위하여 투입된 사업 책임 및 분야별 책임기술자는 과업기간 중에 수급인이 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 한다.

나) 투입된 인력의 수 및 기술자의 능력이 본 용역을 성공적으로 수행하기에 부족하다고 판단하여 발주기관이 보완을 지시할 경우 계약상대자는 즉시 보완하여야 하며, 이로 인한 지연부분에 대하여는 대책을 수립하여 발주기관에 제출하여야 한다.

12) 계약상대자는 본 공사에 사용되는 제품은 국산을 최대한 사용하되 설계의 성능이 보장될 수 있는 KS제품이어야 하며, 특정 제품을 표기하는 경우 발주처의 승인 후 도면에 반영할 수 있다.

13) 계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

14) 신개발공법 또는 신자재를 설계에 반영하는 경우 검토보고서가 있어야 한다.

15) 설계용역의 수행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주기관에 그 내용을 보고하여야 하며, 관계법규 및 계약문서 검토 후 발주기관과 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.

다. 보안 및 비밀유지

1) 계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이   없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다.

2) 계약상대자와 발주기관의 관계에서 성과품, 보고서 등의 검토 및 승인 창구는 단일화하고, 일정 절차와 양식을 통하여 체계화하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

3) 계약상대자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 도서 및 자료를 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

4) 계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 용역감독자와 협의하여 내용의  중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 한다.

5) 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

6) 계약상대자는 보안상 다음사항을 준수하여야 한다.

가) 과업착수를 위한 착수계 제출 시 설계참여자의 보안각서를 첨부하여야 한다.

나) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

다) 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하고 보안 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

라. 하도급의 범위

1) 계약상대자는 본 설계 용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 전기·정보통신, 부대토목, 구조, 조경, 에너지절감 등의 설계업무

라) 제도, 도면작성 및 이에 부수되는 작업

마) 건설공사의 수량내역서 작성 및 견적업무

바) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 계약상대자는 발주청이 특별히 인정하는 업무에 대하여 부분적으로 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급할 수 있으며, 이 경우 당해 용역착수 시 설계협력업체 명단을 발주청에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이때 계약상대자는 하도급된 당해 업무에 대하여도 모든 책임을 진다.

4) 계약상대자는 발주기관으로부터 도급받은 용역에 관하여 하도급계약을 체결한 경우에는 그 계약을 체결한 날로부터 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에 통지하고 관리를 받아야 한다.

가) 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

나) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

다) 하도급 기간 및 하도급 금액 등

5) 용역감독자는 다음에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 즉시 발주기관의 장에게 보고하여야 한다.

가) 하도급 통지 또는 하도급에 관한 승인사항을 위반하거나 일괄 하도급하는 경우

나) 하도급대금 지불과 관련하여 분쟁 또는 민원이 발생하는 경우

6) 계약상대자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

가) 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

나) 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자 (하도급거래 공정화에 관한 법률 제2조9항)

7) 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 기성금 및 준공금을 지급받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당부분에 대한 대금을 지급하여야 한다. (하도급거래 공정화에 관한 법률 제6조 및 제13조3항)

8) 책임한계 - 하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

마. 계약상대자의 유의사항

1) 계약상대자는 설계공모 후 기본 및 실시설계 과정에서 발생되는 설계안의 수정·변경에 대해서 과업을 수행하여야 한다.

2) 설계자는 발주처의 의견 및 요구사항을 최대한 수용하여 설계에 반영하여야 한다.

3) 사용언어 및 문자의 해석에 있어 발주기관과 계약상대자간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 하여야 하고, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽고 정확하게 정의한 후 사용하며, 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

4) 과업 수행에는 필요하나 관련 법규 및 과업지시서에 누락된 사항은 발주처와 사전 협의하여 추가사항을 결정하고, 설계자 부담으로 시행하여야 한다.

5) 총공사비는 예정공사비를 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

6) 관계법령에 따른 인허가 등(설계자문위원회, 건축심의, 건축허가 등)은 설계자의 업무범위에 포함되며, 추후 발주처에서 지정하거나 추천하는 기관 또는 협의체 등에 별도의 설계 설명 요구에 응해야 한다.

7) 계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

8) 발주처는 본 과업수행 중 사업계획 변경 등에 따라 과업내용의 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정·변경할 수 있다.

9) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이더라도 필요하다고 인정되는 중요한 사항은 발주처와 협의하여 결정하고 기타 감독관이 별도 추가과업이 필요하다고 인정되어 요구할 경우, 계약상대자는 이에 따르며 소요되는 비용은 상호 합의하여 정산하다.

10) 계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

11) 계약 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결하고, 만일 협의가 원만히 이행되지 아니할 때에는 관계법령이 정하는 바에 따라 조정위원회 등의 조정, 중재 또는 법원의 판결을 따르되 분쟁기간 중에도 계약상대자는 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니된다.

12) 계약상대자는 용역 업무를 수행함에 있어 고의 또는 과실로 발주기관에 재산상의 손해를 발생하게 한 경우에는 이를 배상하여야 하며, 이에 대한 보험증서(또는 공제증서)를 계약 시 제출하여야 한다.

가) 보증기간 : 설계 착수일로부터 설계용역 최종 납품일까지

나) 보증금액 : 용역계약금액

단, 설계변경으로 계약금액이 변경되는 경우에는 변경된 최종 계약금액

2. 과업의 진행단계

가. 과업의 착수

1) 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 설계용역에 착수하여야 한다.

2) 착수회의에는 사업관련 모든 부문의 대표자들이 소집되어 착수회의를 개최하여 모든 중요한 사항들이 토의되어야 한다.

3) 계약상대자는 정해진 착수회의 전에서 다음 항목의 서류 및 계획서 2세트를 발주기관에 제출한다.

가) 착수계 1부 (공문 포함)

나) 청렴서약서 [서식 1] 및 보안각서 [서식 2] 각 1부 (보안계획서 작성 포함)

다) 책임기술자 선임계 [서식 3] 1부 (자격증 사본, 「건설기술 진흥법」에 따른 경력증명서, 재직증명서 포함)

※ 공동, 분담이행일 경우 대표사 선임계 제출

※ 하도급 공종은 ‘하도급 계약 승인요청서 [서식 4]’에 첨부

라) ‘분야별 참여기술자 명단 [서식 5] 1부

- 설계용역 계약체결 시 제출하는 참여기술자 명단은 실제업무수행자만 배치

- 책임기술자(책임건축사)는 주요협의회(주요회의 포함)에 항상 참석 가능한 기술자 배치

- 책임기술자(건축)는 모든 협의 및 주간 월간업무 작성 기술자로 배치

- 분야별 참여기술자(내국인)의 자격증 사본, 경력증명서(국토교통부 등의 위탁기관) 각 1부

- 분야별 참여기술자(외국인)의 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류 각 1부

- 분야별 참여기술자(하도급 포함) 변경 시, 사전승인 신청요망(용역계약 특수조건 제4조)

※ 착수 시 참여기술자는 계획설계부터 실시설계까지 동일한 구성원으로 배치

마) 설계용역 예정공정표 1부 (세부공정계획사항 포함)

바) 과업수행계획서 1부

- 계약상대자는 아래 내용이 포함된 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급체 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 작성 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 한다. (승인된 과업수행계획서는 본 용역 계약서류의 일부로 간주되며 계약서와 동일한 효력을 갖는다)

- 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표 (비상연락망 포함)

※ 전문분야별 기술자 중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련분야별 작업반이 구성되도록 하여야 한다.

- 각 관련주체(건축, 토목, 조경, 기계, 소방, 전기, 통신, 색채 등)간의 업무범위와 책임한계

- 설계품질 관리계획

※ 설계 과업수행 시 발생하기 쉬운 오류 방지와 설계 성과품의 품질향상을 위한 품질관리방안을 작성하여 제출하여야 한다.

※ 품질관리는 건설기술진흥법 및 동법시행령에 의거 실시하도록 한다.

※ 품질관리 방안에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

품질관리 조직표 / 설계점검 흐름도 / 점검 시기 및 횟수 / 점검사항 및 점검방법 / 기타

- 목표예산(예정공사비)를 고려한 설계운용계획(Design to Cost)

※ 발주청이 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 계약상대자는 공사비통제(Cost Control)를 하여야 하며, 초기단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계 구축방안을 제출하여야 한다.

※ 본 과업내용 중 설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 소요공사비용을 면밀하게 검토, 제출하여야 한다.

※ 상기와 같이 목표예산 범위 내에서 설계가 추진될 수 있도록 규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 유사사례를 비교·분석하여 추정공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출하여야 한다.

※ 부실설계 및 향후 공사비의 과도한 증액이 발생할 경우에는 관련법령에 따라 용역업자 및 용역참여기술자에 대하여 불이익을 줄 수 있다.

- 관계법규·규정에 따른 필요사항, 발주기관 요구사항 및 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

사) 저장장치 USB 1개 - 설계용역계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항, 공동수급협정서(분담이행사별 금액, 비율 표기) 등의 파일 저장

나. 계획설계

1) 계약상대자는 단계별로 약정된 업무회의 및 공정보고에 성실하게 임한다.

2) 계약상대자는 발주기관과 협의하여 과업수행에 필요한 자료수집, 현장조사 및 대지현황조사를 실시하고 현장조사보고서, 현황측량보고서 및 지반조사보고서를 발주처에 보고한다.

3) 업무회의, 공정보고 및 대지관련 현황조사 등에 관한 자세한 과업내용은 ‘3. 과업의 주요업무’를 참조한다.

4) 기존 유사시설의 견학이 필요한 경우 발주기관과 사전 협의하여 결정하고, 견학 후 유사시설 견학보고서를 작성하고 발주기관에 제출한다.

5) 기존구조물이 있는 경우, 조사와 처리방법을 발주기관과 사전 협의하여 과업수행에 필요하다고 확인되면 기존건축물(지장물 등) 조사보고서를 작성하고 발주기관에 제출한다.

가) 계약상대자는 부지 등에 기존 구조물이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대한 상세한 조사를 해야 한다.

나) 계약상대자는 발주기관 또는 계약상대자가 관련기관과의 협의에 의하여 제공되는 모든 기존 구조물의 자료에 대하여 검토한 후 매설된 구조물이 있을 경우 충분한 조사를 통해 구조물별 위치 및 수량 등을 명백히 기록ㆍ관리하여야 한다.

다) 계약상대자는 기존구조물의 이전 또는 철거 등이 필요할 때 이를 설계에 반영 하여야 한다.

6) 계획설계 업무

가) 사전조사 및 자료수집단계에서의 결과를 바탕으로 종합적으로 검토․분석하여 최적의 설계조건을 추출하도록 한다.

나) 계약상대자는 기본 프로그램을 평가하고, 자세한 사업범위를 규정하기 위하여 가능한 합리적으로 많은 검토를 하여야 한다.

다) 자료와 설계조건 등을 재검토하고, 발주기관과 협의하여 당선안을 수정, 발전  시키도록 한다.

라) 설계공모 심사위원 의견 발주기관 협의된 설계반영 항목은 설계공모 심사위원 의견 조치결과보고서로 작성하여 제출한다.

마) 설계대상이 되는 건축물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적 조건을 확정하기 위해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등을 한다.

- 각종 법령상의 제약조건

- 부지의 입지조건

- 유지ㆍ관리상의 조건

- 자연적 환경 조건

- 사회적 환경 조건

- 건축물의 배치 계획상의 조건

- 시공상의 기술적 조건

바) 설계대상이 되는 건축물의 공사비 예산을 확정하기 위해 필요한 업무를 한다.

- 개략설계에 따른 공사비의 예산

- 유지ㆍ관리상의 조건에 관한 조사 연구

- 공사비의 사례에 관한 조사 연구

사) 설계 대상이 되는 건축물의 주변 환경에 미치는 영향을 사전에 파악한다.

아) 추정 공사비에 대한 검토와 계약조건에 따라 기타 추가업무를 수행할 수 있다.

7) 계획설계 제출도서 (계획설계 완료최종)

가) 도서목록 -‘Ⅳ 단계별 설계도서 제출목록’참조

나) 모든 제출도서는 USB로도 저장하여 제출한다.

다. 중간설계

1) 계약상대자는 단계별로 약정된 업무회의 및 공정보고에 성실하게 임한다.

2) 업무회의 및 공정보고 등에 관한 자세한 과업내용은‘3. 과업의 주요업무’를 참조한다.

3) 중간설계 업무

가) 계약상대자는 작성된 계획설계를 기초로 하여 다음 항목을 중심으로 설계를 심도 있게 진행하여야 한다.

- 외장 색채 디자인

- 외장재와 내장재 (견본 확인)

- 외장과 내장의 주요상세

- 에너지절약관련 단열재

- 옥외와 실내 주요 방수재 등

나) 중간설계의 성과품을 검토하여 다음과 같은 계획설계 등의 타당성 등을 재확인하도록 한다.

- 건축규모

- 평면 및 입면, 단면계획

- 동선계획

- 교통처리계획

- 방음대책

- 배수계획

- 설계하중

- 구조물설계

- 연약지반설계

- 시공계획

- 유지관리계획

- 지장물현황

다) 중간설계(기본설계)가 완료된 후 다음과 같은 사항의 변경이 있는 경우 발주기관은 과업수행 시 계약상대자에게 검토하고 조치여부에 대한 보고를 요청한다.

- 계획설계 시에 규정한 각종 조건의 변경사항

- 공사시방서, 설계기준의 변경사항

- 관련계획의 변경사항

- 기타 중요한 변경사항

라) 각종 영향평가, 심의, 인증관련 업무

(1) 계약상대자는 설계예정공정표의 일정에 따라 각종 영향평가, 심의, 인증관련 업무가 원활하게 진행되도록 사전에 필요한 관련 자료를 준비하여야 한다.

(2) 계약상대자는 각종 영향평가, 심의, 인증관련 업무 진행 중 설계에 반영되어야 할  사항이 발생하면, 최적의 방안으로 설계를 보완하고 보완내용은 발주기관에 보고하여야 한다.

4) 중간설계 제출도서 (중간설계 완료최종)

가) 도서목록 -‘Ⅳ 단계별 설계도서 제출목록’참조

나) 모든 제출도서는 USB로도 저장하여 제출한다.

라. 실시설계

1) 계약상대자는 단계별로 약정된 업무회의 및 공정보고에 성실하게 임한다.

2) 업무회의 및 공정보고 등에 관한 자세한 과업내용은‘3. 과업의 주요업무’를 참조한다.

3) 실시설계 업무

가) 발주기관이 실시설계를 함에 있어 작성된 기본설계를 기초로 하여 다음 각 호의 설계도서 중 당해 건축물의 건축허가 신청 및 공사실시에 필요한 설계도서 및 문서를 작성토록 한다.

(1) 대지안내도, 배치도, 각 층 평면도, 입면도, 단면도, 상세도

(2) 구조도면 (구조안전확인대상 건축물인 경우 구조안전확인서) 및 구조계산서

(3) 주차장평면도 (주차장법에 의하여 주차장 설치를 요하는 건축물)

(4) 소방설비도 (소방시설 설치․유지 및 안전관리 관한 법률에 의하여 소방관서의 동의를 요하는 건축물)

(5) 건축계획서 (건축에 관한 사전결정을 신청한 건축물)

(6) 기타 조경계획도, 설비설계도 및 계산서

(7) 공사시방서

(8) 공사비명세서

(9) 건축허가 신청서

나) 실시설계는 기본계획 및 기본설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 실시설계를 하여야 한다.

(1) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 유지관리에 필요한 비용·인력·장비 등 유지관리방법을 제시한다.

(2) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하매설물 및 대상지 주변의 안전관리에 관한 사항이 충분히 검토·반영되도록 한다.

(3) 중간설계도서와 공사비산출서가 발주기관에 의해 승인되고 실시설계의 착수가 지시되면 계약상대자는 국가를 (지방자치단체를) 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의한 발주기관의 공사계약에 요구되는 모든 도서를 준비해야 한다.

(4) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조계산서, 공사비내역서, 발주기관이 승인하는 공사공정표와 입찰을 실시하기 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

(5) 도면과 시방서는 공간요구조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

(6) 계약상대자는 건설공사의 전체 소요 비용에 대한 최종 견적을 조정하여 문서로 발주기관에 제시하여야 하며, 발주기관의 사정변경으로 예산범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우에는 계약상대자가 도면을 수정하여야 한다.

(7) 계약상대자는 최종 성과품을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 하며, 최종 설계도서는 건축사법에 의한 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」을 따른다.

(8) 설계의 각 분야 간 간섭되는 부분은 계약상대자가 책임을 지고 협업·조정  하여야 한다.

(가) 계약상대자는 정확한 축척, 기계 장비의 교체, 복도 및 기타 필요한 면적을 나타내는 종합적인 단면계획을 수행한다.

(나) 부적절한 도면이나 설계도서 간의 간섭은 계약상대자가 책임지며 계약상대자는 입찰단계, 시공단계, 발주기관에 의한 추가 또는 보완되는 도면을 작성한다.

(9) 계약상대자는 색채와 재료의 견본을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

- 외부마감재료 계획

- 내부마감재료 계획

- 색채 계획

(10) 계약상대자는 건축, 구조, 토목, 조경, 통신, 소방, 기계 등 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 각종 표준시방서 및 각 분야별 전문시방서를 기본으로 하여 전문 시방서 공종분류체계에 맞게 공사시방서를 작성하고, 다음 사항을 포함하여 작성한다.

- 일반사항 : 적용범위, 관련규정, 제출물, 품질보증, 운반, 저장 및 취급, 재료 및 사용 기기의 검사, 공사 현장의 안전, 담당원의 입회

- 재료사항 : 재료, 규격 및 제작방법 (KS 관련 규정), 허용오차

-	시공 : 현장여건 확인, 시공준비, 시공법 및 시공 기계의 선정, 사전조사 및 준비공사, 기계의 점검 정비, 시험, 시공사항, 허용오차, 현장품질관리 작업의 안전, 기록

(11) 계약상대자는 실시설계를 진행하면서 공사비관리 (Cost Control)를 하여야 하며, 변경사항이 필요할 때는 중요도에 따라 발주기관에 협의 확인 또는 승인을 받는다. 만약 공사비한계를 초과할 경우 계약상대자는 비용절감을 검토하여야 하며, 또한 공사비가 예산범위 내 조정될 수 있는 의견을 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

나) 각종 인증관련 및 인허가 업무

(1) 계약상대자는 설계예정공정표의 일정에 따라 각종 인증 및 인허가관련 업무가 원활하게 진행되도록 발주기관과 사전협의하고, 필요한 관련 자료를 준비  하여야 한다.

(2) 계약상대자는 각종 인증 및 인허가관련 업무진행 중 설계에 반영되어야 할   사항이 발생하면, 최적의 방안으로 설계를 보완하고 보완내용은 발주기관에 보고하여야 한다.

다) 과업관련 분야의 관계자들은 최종도서 승인요청 전 30일내 현장방문을 하여야 한다. 최종 현장방문 중 재검토해야 될 사항은 다음과 같다.

- 대지의 현황

- 공사에 영향을 미치는 조건

- 자재 야적장, 현장 사무소, 기타 공사 관련 지원 시설

- 설계에 반영되지 아니한 새로운 사항의 존재여부 (기존시설의 철거 등)

- 기존 공급시설

- 기타

라) 계약상대자는 설계예정공정표의 일정에 따라 최종도서제출 전 ‘실시설계 검토용도서’를 발주기관의 감독관과 사전협의 후 제출하고, 발주기관의 검토보완사항(체크리스트)을 설계에 반영하여 최종도서 제출하여야 한다.

- 실시설계 도면

- 총괄원가계산서, 내역서, 산출서, 견적서 등

- 시방서(표준시방서, 특기시방서)

- (각종 계산서)

- 중간설계 및 실시설계 체크리스트 반영결과

- 공사예정공정표

라) 계약상대자는 설계예정공정표의 일정에 따라 ‘공사계약관련도서’를 발주기관의 감독관과 사전협의 후 제출하여야 한다.

- 공사개요서 (공사예정공정표에 의한 공사기간(총차/금차) 포함)

- 총 공사원가계산서 및 각 공사계약별 원가계산서

- 내역서(xls, xlsx, xml), 견적서 (pdf)

- 관급자재 목록 (관급심의결과 변동사항 포함)

- 실시설계도서

4) 실시설계 제출도서 (실시설계 완료최종)

가) 도서목록 -‘Ⅳ 단계별 설계도서 제출목록’참조

나) 모든 제출도서는 USB로도 저장하여 제출한다.

다) ‘사후정산항목 정산자료’ 1부 (분야별 정산항목 포함)

라) ‘참여기술자명단 (최종)’ 3부 (공종, 기술자격, 참여기간, 하도급 공종 포함)

3. 과업의 주요업무

가. 업무회의 및 공정보고

1) 계약상대자는 발주기관과의 원활한 업무수행을 위하여 과업착수(착수계 제출) 시 업무회의를 한다.

2) 이후 다음과 같은 경우에는 반드시 업무회의를 한다.

가) 조사 및 자료 수집 완료 또는 공법 결정시

나) 기본(중간)설계 완료시 (공용건축물협의 포함)

다) 실시설계 완료시 (유지관리계획 포함)

라) 각종 심의 및 자문회의 시 (필요한 경우)

마) 계약심사 시

바) 공정보고 시 (필요시)

사) 준공 시

3) 계약상대자는 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준으로 실시 공정보고서(용역수행 대표자명의)를 작성하여 발주기관에 보고하여야 한다.

가) 설계용역 주간보고 [서식 6] : 주1회 hwp파일 작성 감독관에게 전자우편으로 전달 (매주 금요일까지 제출)

나) 설계용역 월간보고 [서식 7] : 매월1회 작성 (매월 말 오전 10시까지 제출)

※ 필요 시 수정예정공정표 포함

다) 수시보고

- 설계용역 진행 중 문제점 발생 시에는 내용을 분석하여 사전 협의(발주기관 포함) 후 담당감독관에게 제출한다.

- 발주기관에서 주민설명회, 각종 보고회 개최 시 필요도면을 작성 제출하고   계획안에 대하여 사업책임기술자는 지정된 장소에서 설명한다.

※ 계약상대자는 월 1회 과업수행계획서의 예정 공정표를 기준하여 공정보고서를 작성하고, 발주기관에 이를 보고하여야 한다.

※ 계약상대자는 착수와 동시에 작업일지를 작성한다.

※ 수시보고는 발주처와 설계자가 구두상의 협의나 회의를 통해 대신할 수 있다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 계약상대자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 계약상대자 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정한다.

다) 계약상대자는 본 과업지시서에 대한 부분적 대안을 제시할 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 계약상대자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 한다.

마) 계약상대자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적·보완·수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영한다.

바) 설계 진행 시 문제점이 발생하거나 계획·중간·실시설계 보고 시 회의 개시 전 회의에 필요한 자료를 작성·배부하여야 한다.

사) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해관계자 회의, 디자인 향상을 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 계약상대자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성·제출하여야 한다.

아) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

2) 착수회의 (Kickoff Meeting)

가) 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 지정장소에서 개최한다.

나) 착수회의자료 PPT(USB 또는 외장하드)를 사전협의 후 당해 용역의 책임기술자가 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 계획·중간·실시설계 보고회

가)	설계자는 계획·중간·실시설계 발표 자료를 작성하여 발표회 최소 7일 전까지   사전 협의를 거친 후, 수요기관에 해당 자료를 송부하고 보고회 개최 관련사항 등을 협의하여야 한다.

나) 각 보고회 시 사업 책임기술자 참석 필수

4) 수시회의

가) 설계진행 시 문제점이 발생할 경우 이를 분석해 보고자료를 작성하고, 감독관 및 발주기관과 지체 없이 관련사항 등을 협의하여야 한다.

나) 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 필요한 자료를 작성·배부한다.

5) 기타 회의

가) 수요기관 및 감독기관의 필요에 따라 각종 기술사항 검토회의, 이해관계자 회의, 디자인향상을 위한 자문회의 등 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 설계자는 발주기관의 요청에 따라 해당 검토서 등 관련자료를 작성, 제출한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

6) 업무설명회 및 회의내용의 기록

가) 계약상대자는 각종 업무설명회 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출한다.

나) 회의록은 일련번호, 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문, 책임 소재와 일정 등을 포함해 작성한다.

다. 보안관리업무

1) 계약상대자는 본 과업지시서에 따라 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 과업 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 발주기관의 사전 승인 없이는 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2) 계약상대자는 본 용역과 관련하여 작성된 모든 성과품과 진행서류에 대하여는 이를 공개, 공모 등 다른 행위에 앞서 발주기관에 최초로 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 보안상 다음사항을 준수한다.

가) 과업수행에 따른 보안대책을 수립하여 보안상 결격 사항 및 보안 관련 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 조치하여야 하며, 과업수행 책임자 중 1인을 보안관리 책임자로 지정한다.

나) 과업착수 시 참여자 전원에 대한 ‘보안각서 [서식 2]’를 제출하며, 수행인원 교체 시 철수인원에 대한 자료 유출여부 등을 확인하고, 투입인원에 대한 보안교육을 실시하며 보안각서를 제출한다.

다) 자체 정기보안교육(비밀유지 의무, 개인정보 보호, 사고사례 전파, 위반 시 제재 등) 월 1회 이상 실시한다.

라) 발주기관은 계약상대자의 보안관리 상태를 지도·점검하여 보안대책을 위배하였을 때에는 시정요구 또는 참가인원 교체를 요구할 수 있다.

※ 용역수행 전 ‧ 중 ‧ 후 (3회 이상) 현장 보안점검 실시 예정

※ 보안사고 발생 시「사업자 보안위규 처리기준」에 따라 조치

마) 과업수행 중 보안위반사항 발생 시 사업종료일까지 1명의 보안 전담인력을 배치하도록 사업수행계획서에 반영한다.

바) 용역관련 자료(개인정보 포함)는 자료공유 사이트 ‧ 개인 메일함 저장금지 및 전자우편 이용 전송 시 암호화 후 수‧발신해야 한다.

사) 과업의 보안유지를 위하여 용역수행 중 생산·수집된 모든 자료는 보안관리 정·부 책임자를 지정해 관리하여야 하고, 용역 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정해 외부인의 출입을 통제해야 한다.

아) 용역수행을 위해 제공되는 모든 자료 및 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며, 폐기물은 소각 처리하고 소각대장을 관리‧제출해야 한다.

자) 보안 및 비밀 유지사항에 대한 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자 부담이며, 발주기관이 기타 보안 관련사항을 요구하는 경우에는 이에 응해야 한다.

라. 현장조사

1) 관련문헌, 서류조사와 현지답사를 병행한다.

2) 계약상대자는 현장조사에 의한 결과는 현장조사보고서를 작성하여 발주기관에 제출 하여야 한다.

3) 문헌 및 서류조사

(가) 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사한다.

(나) 해당 관계기관 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획 확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수한다.

4) 현지답사

가) 계약상대자는 현지를 답사하고, 지형, 지질 등의 자연현황, 주변도로, 주변공사현장(소음, 진동, 지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등), 위험물저장소, 용지조건 등을 파악하여 계획한 시설물이 현지조건에 적합한지의 여부를 확인하여야 한다.

나) 가스, 상·하수도, 오·폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉·난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다. (관계기관 확인자료 포함)

다) 계약상대자는 공사부지 내 작업장 등의 확보 가능여부를 판단하여야 한다.

라) 계약상대자는 대지현황을 실사한 후 건설공사의 모든 단계에서 필요한 사항(인접대지에 손실을 초래할 사항, 부적절하거나 불확실한 시설, 기타 건설공사 장애요인 등)을 조사하여 발주기관과 협의하고 해결책을 제시하여야 한다.

마) 계약상대자는 공사부지 내 작업장 등의 확보 가능여부를 판단하여야 한다.

바) 현지답사 시에는 반드시 대지전경, 주변조각물, 주변건물, 도로, 담장과 시설물 균열 등을 사진(또는 비디오)을 찍어 사진첩에 정리하고, 설계과업 또는 민원발생 시에 참고자료로 사용한다.

사) 사전조사 소홀로 인한 지하매설물 및 폐기물 등이 발생되어 공사비 증액 등 설계변경 요인이 발생하지 않도록 사전조사를 철저히 하여야 한다.

마. 대지현황조사

1) 계약상대자는 전문적 지식을 활용하여 제공된 대지관련 자료와 서류에 대하여 성실하게 조사ㆍ연구하여야 하며, 대지경계선에 대한 자료, 경사, 높이, 하수로, 지하 매설물, 이용 가능한 시설물이나 상태, 조사자료, 일반기록, 추가정보 등을 참조하여 설계하여야 한다.

2) 업무의 수행에 따라 추가로 요구되는 자료는 발주기관에 서면으로 제출하여 필요한 조치를 취해야 한다.

3) 발주기관의 대지현황자료 (2024.11. 시행)

가) 지적측량

나) 현황측량

다) 지질조사

4) 측량조사

가) 측량은 측량법령 및 공공측량의 작업규정에 관한 기준에 따라 시행하여야 하며, 기본설계에서 과업에 필요한 모든 측량을 수행한다.

나) 계약상대자는 측량을 실시하기 전에 측량 작업계획서를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 하며 계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- 조사측량

- 작업계획서 (외업, 내업)

- 인원편성

- 측량실시시기

- 주요기기

- 특기사항

- 위치도 등 기타 필요한 사항

다) 측량 기구는 각 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며 사용 시에는 점검 및 보정을 하여야 한다.

라) 계약상대자는 측량작업 시 안전사고 방지에 유의하여야 하고, 안전사고 발생에 따른 모든 책임은 계약상대자가 진다.

마) 관계기관의 제 수속은 계약상대자의 부담으로 신속히 처리하고, 진행 중 발생되는 비용은 발주기관에 요청할 수 있다.

바) 사전조사 소홀로 인한 지하매설물 및 폐기물 등이 발생되어 공사비 증액 등 설계변경 요인이 발생하지 않도록 사전조사를 철저히 하여야 한다.

사) 교통, 보행금지 또는 제한이 필요한 경우 관할 경찰서 등과 협의 후 시행하여야 하며, 관련기관 협의 시 발주기관은 필요한 행정절차 이행 등 행정 지원을 한다.

아) 성과품 (원도, 작업일지, 야장)은 용역준공 납품 시 발주기관에 제출하여야 한다.

자) 각종 기준점은 가능한 변형이나 침하가 발생하지 않는 고정점으로 선정하고, 필요 시 인조점을 두며 인조점은 기준점 1개소당 3개 이상, 변형되지 않도록 설치하여 항상 기준점에 대한 확인이 가능하도록 하여야한다.

차) 과업수행에 필요에 따라 현황측량, 중심선측량, 종단측량 및 횡단측량을 선택하여 실시한다.

(1) 현황측량

(가) 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

(나) 각도는 도·분·초로, 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

(다) 축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 측량면적은 과업 대지면적의 10% 이상 여유 있게 측량한다.

(라) 측량면적은 사업 대지경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주기관과 협의 후 결정한다.

(마) 측량성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기한다.

(바) 등고선은 최소 1m 간격으로 표시하여야 하고, 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

(사) 전기 및 통신, 상·하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

카) 본 지침서에 명기되지 않았으나 계약상대자가 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시하고, 발주기관이 서면으로 지시한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산한다.

타) 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우, 감독관의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

5) 지장물조사

가) 각종 지하 매설물 및 지상의 지장물에 대한 현장 및 자료를 정확히 조사하여 설계에 반영한다.

나) 지장물 중 이설이 필요한 시설(전신주, 가로등, 신호등, 맨홀, 상수도관, 하수관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관 등)은 해당 기관과 협의한 후 이설비를 산출하여 사업비에 반영한다.

다) 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 상의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

라) 조사된 지장물은 지장물 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.

마) 조사된 지장물은 공사 중 위치 착오 및 불명확으로 인한 안전사고 예방을 위하여 정확히 표시한 지장물 조사목록 및 도면을 작성하여야 한다.

바) 조사 작업 중 지하 매설물 손상 및 안전사고는 계약상대자의 책임으로 한다.

사) 지장물 소유자 및 이해관계자의 현황을 조사하여 제출하여야 한다.

6) 지반조사 (KDS 11 10 10 지반설계기준)

가) 지반(지질)조사는 「엔지니어링산업 진흥법」에 의한 지반 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링 활동 주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행한다.

나) 본 과업지시서에 명기되지 않았으나 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면으로 제출하여 발주기관과 협의 후 실시한다.

다) 지반조사의 조사계획서 및 굴착행위신고서를 작성하여 발주기관의 승인을 득한 후 조사에 착수하여야 하며, 조사계획서는 계약서, 과업지시서, 지반조사편람 등을 참고하여 작성하되, 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 조사내용 (목적ㆍ개요)

- 조사의 순서 및 방법 (위치도, 계획표, 시험방법 등 포함)

- 조사공정표

- 조사조직표

- 조사내용, 조사방법, 조사장비

- 가설비 계획

- 기타 교통처리 등 필요한 사항

- 조사수량 (시추위치, 심도, 현장시험, 실내시험 포함)

라) 현장시추작업 시 반드시 현장에 건축 및 토목 분야의 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장시추일정을 발주기관과 협의하여 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만, 발주기관 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장시추 전 과정에 대한 현장시추결과보고서 (사진 등 증빙자료 포함)를 발주기관에 보고한다.

마) 안전관리

(1) 계약상대자는 공사안전 관리지침을 참고로 하고, 항상 조사의 안전에 유의해 현장관리를 하여야 하며 재해의 방지에 노력하여야 하고, 조사현장이 위험하여 일반의 출입을 금지할 필요가 있을 경우는 가설펜스 등에 의한 충분한 안전조치 및 출입금지의 표시를 해야 한다.

(2) 계약상대자는 조사 실시 중 관리자의 허가 없이 유수 및 교통의 방해, 공중에 불편이 되는 행위 및 조사방법을 택하여서는 안 된다.

(3) 계약상대자는 조사지점 주변에 있는 지상·지하의 기존 및 가설구조물에 피해나 지장을 미치지 않게 조치하여야 한다.

바) 계약상대자는 본 과업을 수행함에 있어 지형도, 지질도, 항공사진 등과 타기관에서 기시행한 조사기록과 기본설계 등 기존자료를 수집하고 대상 지역의 지형 및 지질특성을 파악하여 시추공의 위치 등을 포함한 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과 분석 시에 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

사) 축척 1:25,000 지형도와 기존지질도를 이용하여 계획지역 일대에 노출되어 있는 지층의 다음과 같은 특성을 위주로 지표지질조사를 시행하여야 한다.

- 암석의 종류 및 분포상태

- 풍화심도 및 상태

- 절리나 단층 등 지질구조의 발달상태

- 계획지역 지역사면의 안정성

- 구하천이나 매립지의 분포

- 지반의 투수성, 자연 지하수위, 피압 용출수 등 지하수 특성

- 풍화대, 퇴적층 및 연약지반 특성 및 분포상태

- 기타 구조물 건설에 영향을 줄 수 있는 제반지형 및 지질적 주변상태

※ 암석의 분류는 역학적 특성과 탄성파 속도에 따라 연암, 보통암, 경암 등으로 구분하며, 불연속면(절리, 단층 등)과 같은 암반의 특성을 설계에 반영한다.

아) 시추조사

(1) 지반(지질)조사는 원칙적으로 주요구조물의 설치예정지 검토 후 발주기관이 승인하는 위치에서 실시하되 토층여건과 변화에 따라 시추위치 및 수량을 변경할 수 있다.

(2) 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 지질조사 전 측량을 실시하고, 좌표 및 표고를 보고서에 명기한다.

(3) 지하매설 지장물이 예상되는 지역은 피하여 인근지점에서 시추를 실시하되 일정 심도까지 인력터파기를 실시하여 반드시 지장물을 확인하여 지장물의 파손을 사전에 예방하여야 한다.

(4) 시추방법

(가) 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 사용하고 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 한다.

(나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고 공사기간 중 장기적 안정성이 요구되는 주요 구조물 설치지역은 발주기관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있으며 기반암층 확인을 원칙으로 하되 기반암이 깊을 경우 지지층 하부 5.0m이상 또는 기초폭 단변의 2배 이상을 시행한다.

(다) 시추 시 사용하는 용수는 굴진 시 순환수나 슬라임의 색조를 이용하여 지층변화 상태를 파악할 수 있도록 청수를 사용하여야 한다.

(라) 암반층 시추 시에는 반드시 다이아몬드빗트를 사용하고 이중 코어베럴을 사용하여 코어회수율을 최대한 높여야 하며, 굴진속도를 가능한 범위 내에서 암층별로 구분, 기록 유지하여야 한다.

(마) 지반강도가 낮은 풍화토층, 풍화암층, 연암층 또는 파쇄대가 나타나는 경우는 코어 회수율을 높이기 위하여 삼중 코어베럴이안 D-3 코어베럴을 이용하여 시추한다.

(바) 시추각도는 수직으로 함을 원칙으로 하되 지표 지질조사 결과에 따라 파쇄대나 단층 등 구조선의 확인 등을 위하여 필요한 경우에는 경사시추를 수행하여 최대의 시추효과를 얻도록 한다.

(5) 연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내시험용 불교란 자연시료를 채취 하여야 하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

(6) 시추공내의 지하수위는 시추 완료 후 24, 48 및 72시간 단위로 각각 측정하여 조사지점의 수위 변동 상황을 관찰하고, 만약 지하수위의 유동이 심한 지점은 일정기간을 설정, 수시로 측정하여 지하수위의 변동원인 및 상태 등을 파악하고 공사에 미치는 영향을 검토한다.

(7) 연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내시험용 불교란 자연시료를 채취 하여야 하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동 중의 교란을 방지한다.

(8) 시추공 보존

(가) 시추를 완료한 시추공은 매몰되지 않게 PVC 관과 뚜껑을 설치하여 공사 중 지하수위 측정이 가능하도록 하여야 한다.

(나) 별도의 이용계획이 없는 시추공은 오물이 투입되지 않도록 하여야 하며, 지표면 하부 1m 까지는 벤토나이트 또는 시멘트 슬러리를 주입하여 다짐하면서 되메움한 후, 되메움 조치한 굴착공 위에 30∼40cm 두께의 콘크리트를 밀봉하고, 콘크리트면에서 지표면 까지는 깨끗한 흙으로 다지면서 되메움하여야 한다.

(다) 채취된 시료는 시료상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다.

- 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호

- 상자 내부에서 토사나 암석 코어를 채취 심도별로 구분 보관

- 암석코어가 아닌 슬라임만이 채취된 경우에는 슬라임을 흙 시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관

(라) 시료상자는 천연색 사진으로 촬영하여 보고서에 천연색 인쇄로 첨부한다.

- 이때 사진은 코어가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영

- 암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코어 표면에 살포하여 젖은 상태에서 촬영

자) 현장시험

(1) 기초구조설계에 필요한 시험은 발주기관의 승인한 위치에서 조사를 실시하고, 시험위치는 좌표를 보고서에 명기하고, 그 결과를 설계에 반영한다.

(2) 표준관입시험

(가) 표준관입시험은 KS F 2307 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시하여야 한다.

(나) 시험횟수는 지층이 변할 때마다 동일층이라도 1.0m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라고 관입깊이가 10cm 미만일 때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격횟수를 기록한다.

(다) 채취된 시료를 함수비 변화가 없도록 200ｇ이상으로 2개의 시료병에 넣어 밀폐시킨 후 시추번호, 심도 및 N치, 현장 토질분류 등 제반 정보가 기록된 명패를 부착한다.

(3) 기타 현장시험

(가) 현장여건 및 설계목적상 필요하다고 판단되는 경우 계약상대자는 다음과 같은 시험을 수행할 수 있다.

- 함수비, 비중, 액성한계, 소성한계, 체분석시험 등

(나) 이때 계약상대자는 추가시험의 합당성에 대한 전문가의 자문의견서를 첨부한 시험계획서를 제출하여 발주기관의 검토, 확인 후 사전승인을 득하여야 하며, 시험소요 경비는 실비 정산한다.

- 양수시험, Sounding, 물리탐사, 공내재하시험, 현장투수시험, 지오토모그라피탐사 등

차) 실내시험

(1) 토질시험 - 시추조사 등에서 채취된 시료의 시험은 다음과 같은 KS규정에 의하여 실시한다.

- 함수비 시험(KS F 2306)

- 밀도시험(KS F 2308)

- 액성한계ㆍ소성한계시험(KS F 2309)

- 투수시험(KS F 2322)

- 흙의 0.08mm 체 통과량 시험(KS F 2309)

- 입도시험(KS F 2302)

- 다짐시험(KS F 2312)

- 현장밀도시험(KS F 2311)

- 노상토 지지력비(CBR)시험(KS F 2320)

(2) 암석시험 - 시추조사 등에서 채취된 시료의 시험은 다음과 같은 KS규정에 의하여 실시한다.

- 비중시험(KS F 2518)

- 흡수율시험(KS F2518)

- 탄성파속도시험

- 탄성계수시험

- 포아송비시험

- 일축압축강도시험(KS F 2314)

- 삼축압축강도시험(KS F 2346)

- 인장강도시험

- 점하중강도시험

- 절리전단강도시험

(3) 시험시기 - 토질의 물성시험은 노선 전구간에 대하여 교란된 시료를 대상으로 흙의 물성이 변화되기 이전에 실시하고 역학시험은 교란되지 않은 시료가 채취될 경우 필요한 지점에 대하여 하여야 한다.

카) 보고서 작성

(1) 계약상대자는 조사 종료 후 지하질의 분포상태, 연약층의 유·무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위해 보고서 작성 시 다음과 같은 내용을 수록한다.

- 조사명 및 조사시행자명

- 조사요약 보고문 (대표 및 기술자의 인명날인)

- 조사개요

- 세부내용

지층분포상태 및 지층의 특성 / 지하수위 분포 / 표준관입시험 결과 / 각종 시험성과 및 분석자료 / 지반정수 산정자료 및 기초지반의 지지력 / 시추주상도 / 토층단면도 / 조사위치평면도 / 조사현황사진 / 보링코어사진 / 지질도 / 위치도 / 기타 필요자료 (보링 주상도에 사용하는 심볼 (Symbol) 등 각종 표시 및 기호는 표준기호 사용) / 기초형태에 대한 제안

(2) 조사 세부내용 중 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

- 조사명, 조시시간, 조사위치, 조사자, 시행자

- 시추번호, 시추장비명, 각 채취시료의 위치 및 심도, 시추 중에 나타난 층의 관찰

- 지하수위 (시추 완료 후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정)

- 코아 회수율 및 천공속도, 앞 층 천공압력 및 비트 회전속도

- 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항, 시추 중에 판단하는 토층 및 암층분류, 토층 및 암층의 심볼 위치

7) 표토 및 지장수목조사

가) 식재지반조성을 위한 표토는 전문기관에 토양조사를 의뢰, 분석결과에 따라 조경기술사 등 관련 전문가의 검토의견을 수렴하여 표토의 수집과 보관을 위한 계획을 한다.

나) 사업부지내의 기존수목의 현황을 조사하여 활용계획을 수립한다.

다) 기존수목이 현 상태로 보전이 불가능한 경우 기준에 따라 이식을 계획한다.

라) 지장수목은 가급적 이식을 원칙으로 하되, 조경적 가치와 경제성 등을 종합 고려하여 이식이 적합하지 않을 경우 벌채 처리한다.

8) 교통량 및 교통시설조사

가) 계획지역 주변 가로망현황과 교통관련시설 (보도 육교, 지하철 관련시설, 주차장, 버스정류장, 택시정류장, 교통신호등, 기타)

나) 계획 지역 주변 교차로의 교통신호 운영현황과 교통량을 조사한다.

다) 계획 지역 주변의 교통 유발시설에 대해 면밀히 조사하여 (학교, 공공시설, 교통운송터미널 등) 교통시설 계획에 반영한다.

라) 기 조사된 교통현황자료를 비롯하여 각종 교통관련 자료를 수집한다.

9) 배수시설 조사

가) 계획대지 주위의 하수처리시설을 조사한다.

나) 암거 및 배수구조물의 위치를 선정, 홍수량과 홍수위를 추정하고 구조물의 규격을 결정하며, 노면배수와 횡단배수 처리를 원활하게 하여야 한다.

다) 현지조사 항목

- 과거최고 홍수위

- 부근 기존구조물의 규격 및 부근 수리시설 용량

- 하천의 현황

라) 자료수집 항목

- 강우강도

- 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

10) 소음 및 진동조사

가) 시설물 설치로 발생되는 소음․진동으로 주민생활의 불편을 초래하게 될 것으로 예상되는 곳에서는 시설물 설치전의 소음․진동 현황을 조사하고 시설물 설치 후의 소음․진동을 예측하여 이에 대한 대책을 설계에 반영하도록 기재한다.

나) 계획대지 주변 도로에서의 소음을 측정 조사한다.

다) 소음 측정은 오전, 오후, 저녁 각각 3회 이상을 실시하여 최대 및 최소상태를 조사한다.

라) 사업시행으로 인한 환경영향을 예측하여 저감대책을 수립하고, 공사진행 중 환경저감시설(가림막, 소음방지시설, 분진방지시설 등)을 시공계획서 및 공사시방서에 반영한다.

11) 구조물조사

가) 계획 대지 부근의 기존 건물을 비롯한 각종 구조물 현황과 문화재 현황을 조사한다.

나) 각종 구조물 및 문화재가 계획 대지에 인접하여 있을 경우 문화재의 위치 등에 대한 상세사항을 현장조사 및 관련 자료를 통해 확보하고 조치계획을 발주기관과 협의한다.

12) 용지조사

가) 계획 대지 및 주변의 지장물별로 지번과 건물의 소유자를 조사하여 용지도를 작성해야 한다.

나) 발주기관의 요구 시 지장물 현황조서를 용지도와 함께 제출하여야 한다.

다) 각종 인·허가 사항을 조사하여 과업수행에 차질이 없도록 한다.

라) 민원 발생 예정 지역 및 협의 사항을 조사ㆍ검토한다.

13) 기타 계획 자료조사

가) 주변지역 내의 제반 사업계획을 조사하여 본 과업과의 연관성을 상세히 검토 후 반영한다.

나) 계획 대지와 관련한 도시계획의 현황과 토지이용계획 등을 상세히 조사·검토하여 사업계획에 반영한다.

라. 발주기관의 공정검토

1) 계약상대자는 다음과 같은 발주기관의 중간 공정검토에 필요한 사항을 설계용역의 공정에 반영하여야 한다. 단, 검토기간은 과업수행계획서 제출 시 발주기관과 협의하여 정한다.

2) 계약상대자는 중간 검토에 필요한 제반 서류를 제출하고 승인 절차를 거쳐 다음 단계로 설계를 진행하며, 서류 제출에 따른 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

3) 용역 수행 진도에 따라 4단계로 구분 검토

가) 과업착수 - 과업수행계획서 제출 시

- 사업 추진 계획, 지반 조사 등 기초자료 조사 계획의 적정성 여부

- 참여 인력의 기술 능력, 외주 집행계획의 적정성 여부 및 공사비용 검토 등

나) 계획설계 (공정 20%)

- 각종 설계기준 적용 적정여부

- 기본계획안 및 비교안 검토 시 세부사항 검토 적정여부

다) 중간설계 (공정 50%)

- 공사적정 제품선정과 설계적용

- 공사 중 발생할 수 있는 유해환경 (소음, 먼지 등)에 대한 보호 대책여부

- 각종 설계안의 경제성, 시공성, 적정 여부

라) 실시설계 (공정 90%)

- 구조 등 각종 계산 및 각 분야별 공사비 적정여부

- 시공계획 및 시공성 적정여부

- 관련법규 및 시방서 내용 부합여부 등

마. 자재선정업무

1) 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 국산자재 사용을 최대한 고려하고, KS제품과 국토교통부 지정 AT인증, 지식경제부 지정 NT인증, 고효율 인증 제품이 있는 경우에는 이를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하되, 기타 자재는 공인기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다.

2) ‘1)’ 이외의 자재 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고, 사후관리 시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 특정자재의 수량, 단가, 금액 등은 ‘특정자재 설계목록 [서식 9]’을 작성하여 발주기관과 협의 후 채택한다.

3) 인체에 유해한 물질(예 석면 등)이 함유된 자재는 사용하지 않도록 하며, 건설폐자재 등 친환경자재 활용방안을 검토하여 제시하여야 한다.

4) 설계에 사용하는 재료가 아래 사항의 수입품 또는 특정제품 (공법, 기술)에 해당될 경우에는 발주기관의 승인을 받아 설계에 적용하여야 하며, 승인을 위한 자료조사나 보고서 작성 등 제반 업무는 계약상대자가 준비하여야 한다.

가) 공사금액 중 특정제품의 품명 당 원가가 5천만을 초과하는 경우

나) 공사 성격 (내구성, 친환경, 불연성 등)이나 특수한 기술 등으로 특정공법의 설계금액 (제경비 제외)이 1억원을 초과하는 전문공사를 포함한 공사의 경우

※ 특정제품 - 물품제조․구매 및 공사 발주 시 계약목적 달성을 위하여 불가피하게 물품 등에 대한 제조업체명, 제품모델명, 특정규격(사양) 및 공법(기술) 등을 계약문서에 표기 (조건제시 포함)함으로써 다른 제품 (공법)으로 대체할 수 없는 경우의 제품과 공법을 의미한다.

5) 관급자재

가) 관련근거

(1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제83조 (건설공사에 대한 자재의 관급)

(2) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제11조 (공사용 자재의 직접구매 증대 등)

(3) 「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준 (조달청 훈령)」

나) 계약상대자는 수요기관과 협의한 후 관급자재 품목과 내역을 작성하여야 하며, 관급자재가 일반품목으로 공급이 가능한지 충분히 고려해야 한다. 다만, 고시품목 중 설계의도 구현을 위한 특수기술이 필요한 설계반영품목에 대하여 발주기관과 협의 후 설계반영품목 요건검토서를 작성하고 수요기관에 제출하여야 한다.

다) 계약상대자는 국가종합전자조달시스템에 신청한 제품에 대하여 설계적합 검토를 실시하여야 하며, 운영기준 제9조제2항에 따라 적합 및 부적합 사유를 작성하여야 한다.

라) 설계적합 검토 결과 적합제품이 10개사를 초과한 경우 종합평가 대상을 설계적합도 순으로 10개사로 정할 수 있다.

마) 계약상대자는 관급자재 선정심의 운영에 적극 협조하여야 하며, 관급 심의에 필요한 관급자재 선정검토서와 청렴서약서, 심의에 필요한 자료 (제품설명서, 규격서, 인증관련서류 등)를 작성하여 제출하여야 한다.

바) 심의회에 참석하여 설계반영품목 선정 설계기준 및 적합 신청제품 추천의견 설명, 심의위원 질의에 대한 답변을 충실히 하여야 한다.

사) 계약상대자는 설계용역 수행과정에서 관급자재를 납품하고자 희망하는 업체에게 어떠한 금품·향응이나 부당한 이익을 제공 받을 수 없으며, 이를 위반할 경우 한식진흥원의 조치와 관련하여 민·형사상 이의를 제기하지 못한다.

Ⅲ		과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행은 「건축법」, 「건축사법」, 「건축서비스산업 진흥법」, 「건설기술 진흥법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」, 「환경 친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 「지적측량 시행규칙」, 「환경 영향 평가법」, 「도시교통정비 촉진법」, 「정보통신공사업법」, 「전기공사업법」, 「전력기술관리법」, 「소방시설공사업법」, 「실내공기질 관리법」 등 관련 법령과 해당 고시·지침 및 지자체의 조례 등을 적용하여 당해 사업이 관계 규정 (최신)에 위배되지 않도록 한다.

나. 본 과업은 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침」 (국토교통부 고시)에 따라 수행한다.

다. 본 과업의 설계도서 작성기준은 「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 (국토교통부 고시)」 제24조 (설계도서 작성기준)에 따라 국토교통부 장관이 정한 ‘건설공사의 설계도서 작성기준’에 따라 작성한다.

라. 본 과업은 「건축구조기준」(국토교통부 고시)에 따라 내진설계를 수행한다.

마. 계약상대자는 본 과업지시서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우, 이를 발주기관에 통보하여 (관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

바. 설계의 책임 및 손해보상

1) 계약상대자는 계약에서 정한 기간이내에 성과품 제출을 완료 하여야 하며, 이를 위반 시 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제18조 (지체상금)에 따라 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자 (설계도서 상호간의 상이,  건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여  발생되는 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 계약상대자는 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 에로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령 (「건축사법」 제11조 (자격의 취소 등), 제20조 (업무상의 성실의무 등))에 따라 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 계약 상대자는 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

가) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제53조 (손해보험의 가입)

나) 「(계약예규)용역계약일반조건」 제41조 (계약상대자의 손해배상 책임)

다) 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조 (엔지니어링사업의 대가 기준 등) 및 동법  시행령 제42조 (엔지니어링사업자의 손해배상보험·공제 가입)

라) 「건설기술 진흥법」 제34조 (건설엔지니어링사업자의 손해배상 및 하자보증) 및 동법 시행령 제50조 (건설엔지니어링사업자의 손해배상 및 하자보증)

마) 「설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령」(국토교통부 고시)

바) 「건축사법」 제20조 (업무상의 성실 의무 등) 및 동법 시행령 제21조(건축사의 보험 또는 공제 가입)

4) 대상 용역이 종합심사낙찰제 (또는 종합심사평가제) 대상 공사일 경우 물량내역 수정허용 공종 선정 및 물량산출 적정성검토 등의 업무에 협조한다.

2. 설계일반지침

가. 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서로 구분하여 단계별로 제출한다.

나. 설계공모지침에서 제시된 내용들을 충분히 반영하여 설계되어야 한다. 단, 현장조사 결과 설계공모지침을 지키기 어려운 경우, 발주기관과 협의 후 승인된 변경사항을 설계에 반영한다.

다. 건축협의(허가)와 각종심의를 고려한다.

1) 해당 허가권자와 사전 협의를 통하여 관계법 등에 따른 불필요한 변경이 생기지 않도록 용역일정을 관리한다.

2) 각종 심의 및 예비인증 등 관련기관 심의 시 문제가 없도록 사전 검토를 철저히 하고 심의일정에 의한 차질이 없도록 한다.

라. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 대지현황 및 주변 인접대지 현장조사 및 지반조사, 측량, 우수량, 지하수위 등을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 외부공간 계획 시 접근성을 고려하여 보행로 및 진입공간을 조성하고 관광객, 지역주민 등의 커뮤니티 활성화를 위해 외부공간을 공유할 수 있도록 설계한다.

3) 접근로의 교통량 및 이용자 추이를 분석하여 보행자 동선을 고려한 합리적이고 쾌적한 진·출입 동선 및 주차계획을 반영하여 설계한다.

4) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

5) 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

6) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고, 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

7) 현실성 없는 과도한 디자인을 지양하고 사업목적에 맞는 시설물을 편의성에 맞도록 동선을 고려하여 계획하며 친환경적이고 자연적인 소재를 적극 활용하여야 한다

8) 관련기관 심의 시 문제가 없도록 사전 검토를 철저히 하고, 심의일정에 의한 차질이 없도록 한다.

9) 각종 시설의 배치, 규모, 등 세부적인 사항은 설계자가 설계요구 조건 등을 고려하여 적절하게 배치하여 창의성이 발휘 될 수 있도록 한다.

마. 미래지향적 첨단시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 설계하여야 한다.

2) 전기, 수도 및 각종 설비는 물리적 보안성, 생존성, 확장성 등을 고려하여 증축, 내부공간 분할시공 등이 가능하도록 설계하여야 하며 특히, 정보통신망은 발주처와 사전 협의 후 적합한 수준을 반영하여야 한다.

3) 건축물 내부 공간의 기능 변화와 확장성을 확보하고 내부공간의 모듈화, 기능적 분리 및 유기적 연결성을 고려한다.

바. 에너지 절약형 (Energy Saving) 건축물 설계

1) ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’, ‘건축물의 에너지 절약설계기준’, ‘건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준’ 등 기타 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다. 특히, 냉난방설비는 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스, 집단에너지 사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지, 소형열병합발전을 이용한 에너지, 신재생에너지 등 각종 냉난방설비 별 장단점 비교검토 후 설계하여야 한다.

가) 「건축물 에너지절약 설계기준」에 따라 설계하고, 건축허가 신청 전 한국 에너지공단과 에너지절약 사전협의를 실시한다.

나) 건축물 에너지효율 1++등급 예비인증 등을 취득해야 하며, 취득에 필요한 수수료 및 기타비용(컨설팅 비용 등)을 포함한다.

2) 창호, 내·외벽, 슬래브, 지붕 등 관련 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) ‘효율관리기자재 운용규정’ 및 ‘고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정’을 준수하여 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템으로 설계하여야 한다.

4) 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법 제12조 제2항 및 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정 (산업통상자원부 고시), 신재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침(신·재생에너지센터 공고)을 준수하여 신·재생에너지 설비를 설계하여야 한다.

5) 자연채광을 적극 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

6) 방문객과 근무 직원의 쾌적성과 편리성의 확보를 우선고려한 후 에너지절약형 설계를 적용한다.

7) 기타 에너지 관련 제반 규정을 적용한다.

사. 환경 친화적 부지환경 조성 및 친환경적 설계

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용 극대화 및 쾌적한 환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우·오수계획, 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

3) 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려하여 설계하여야 한다.

※ 소음·진동관리법 제21조 (생활소음과 진동의 규제), 제29조 (방음·방진시설의 설치 등), 제40조 (방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계하여야 한다.

아. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 주요 출입 장소 및 중요 시설물에 대한 24시간 감시체계를 구축한다.

3) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법을 고려하여 경제적으로 설계한다.

4) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

자. 각 시설은 전기, 통신, 기계, 방재, 가구 등에 이르기까지 사무자동화, 통합보안시스템 등 최신식 자동관리가 될 수 있도록 계획한다.

1) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선 (직통, 교환기, fax, 인터넷 전화, 건물 내·외 AP 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영  하여야 한다.

2) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

3) 전기·정보통신분야 (LAN 분야 등)는 미래지향적인 기술기준을 적용

4) 모든 사항은 최근 개정·시행된 법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

차. 가설구조물 설계

1) 계약상대자는 「건설기술진흥법」 제48조 제5항에 따라 시공과정에 필요한 가설구조물의 안전성 검토를 실시하고, 설계도서를 작성하여야 한다.

○ 높이가 31m 이상인 비계

○ 브라켓 (bracket) 비계

○ 작업발판 일체형 거푸집 또는 높이가 5m 이상인 거푸집 및 동바리

○ 터널의 지보공 (支保工) 또는 높이가 2m 이상인 흙막이 지보공

○ 동력을 이용하여 움직이는 가설구조물

○ 높이 10m 이상에서 외부작업을 하기 위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물

○ 공사현장에서 제작하여 조립ㆍ설치하는 복합형 가설구조물

○ 그 밖에 발주자 또는 인·허가기관의 장이 필요하다고 인정하는 가설구조물

2) 계약상대자는 산업안전보건법에 따른 설계안전보건대장, 건설기술진흥법령에 따른 안전관리계획 수립 시 가설구조물에 대한 위험요소를 발굴하여 저감대책을 수립하고, 이를 설계도서에 반영해야 한다.

카. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 진동하중에 대한 검토를 적용한 안전한 구조설계를 계획한다.

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태 (실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계가 되어야 한다.

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어지게 설계하여야 한다.

4) 설계자는 설계완료 후 설계과정 중 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소/위험성/저감대책 형태로 작성된 설계안전검토보고서 (건설공사 안전관리 업무수행 지침의 서식 반영)와 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항을 작성 제출하여야 한다.(건설기술진흥법에 따른 설계의 안전성 검토 대상일 경우)

5) 본 공사의 굴착, 토공사 (흙막이), 철거공사, 가설공사, 파일공사, 골조공사 등의 시행 시 지형 조건과 장마철 등 기후조건에 대해 적절하게 설계에 반영되어야 하며, 가설공사 시 대공간에는 시스템 동바리 등 (필요시)을 고려하여 안전하게 설계되어야 한다.

6) 신중한 터파기 계획으로 인접건물 침하대책을 고려하여 설계하여야 한다.

타. 해당 건설공사 중 유해ㆍ위험 요인의 감소방안을 마련하여 공사 중 산업재해 예방을 위한 설계가 될 수 있도록 해야 한다.

1) 유해·위험요인에 대한 설계조건

No	유해· 위험요인	설계조건
1	추락	·추락사고 시 작업자의 안전을 위한 가설 계획 마련 1) 가설공사에 외부 시스템비계 및 안전발판 반영 2) 외부시스템비계 수직보호망 설치. 해체 반영 3) 시스템비계，시스템동바리 구조계산서 및 시공상세도 반영
2	전도	·장비 등의 전도 시 피해가 최소화 될 수 있는 장비·인원 투입 계획을 반영한 공정 계획 마련 1) 공통가설공사에 타워크레인(적용시) 붐대 회전반경을 고려한 인양톤수, 규격검토 2) 마감공사 시 수직형 고소작업대 사용기준 공사시방서에 반영
3	낙하	·공사 중 낙하 사고에 따른 작업자의 안전을 위한 가설 계획 1) 중정, 대형개구부 공간에 수평 안전망 설계반영 2) 주, 부출입구 상부 방호선반 설치 공사시방서 안전관리 반영
4	비래	·비래 사고 예방을 위한 공정 계획 마련 1) 합판, 단열재, 비중이 낮은 재료 보관장소 공사시방서 지정 2) 외벽창호 설치 후 마감재 양중공정계획 수립
5	충돌	·사고 예방을 위한 장비ㆍ인원 투입 계획을 반영한 공정계획 마련 1) 지게차, 굴삭기 회전반경내 근로자 접근금지 신호수배치 의무화 2) 건설장비 후사경 및 CCTV설치의무화 공사시방서 안전관리반영
6	협착	·협착사고 예방을 위한 장비 관리계획 검토 1) 목재가공용 둥근톱 방호장치 안전관리비 계상 2) 건설기계 회전체 커버설치 안전관리비 계상 3) 철근 가공용 기계 U자커버 설치 안전관리비 계상
7	붕괴	·공사중 붕괴 예방을 위한 설계안전성 검토 1) 적정횟수 지반조사 통한 흙막이벽체 지지공법, 차수공법, 계측기 설계 2) 거푸집동바리 및 거푸집높이가 5m 이상인 경우 시스템동바리 가설공사에 반영 (가설구조물안전성검토비용 포함) 3) RC보와 데크슬래브 접합부 상세설계 4) 굴착깊이가 10m이상은 소규모 지하안전영향평가, 굴착깊이가 20m 이상일 경유 지하안전영향평가 실시
8	위해물질 등의 접촉	·위해물질 등의 접촉 사고 예방을 위한 공정 계획 마련 1) 정화조 등 밀폐공간 방수공사 MSDS(물질안전보건자료)참조하여 무해한 방수공법 설계
9	감전	·사고 예방을 위한 공정 계획 마련 1) 전기공사에 가설분전반, 변전실 접지 설계 반영 2) 현장 주변 고압선 방호관설치 안전관리비 계상
10	폭발	·적정 안전관리비 계상 및 가설 계획 마련 1) 가스, 기름보관장소 등 위험물 저장소 안전관리비 계상 2) 암반파쇄 시 발파전문가 용역비 계상 3) 가스탐지기 구입비 안전관리비 계상
11	화재	·화재 빈발 공종의 적정 공정 계획 마련 1) 설비공사의 용접작업 시 휘발성공사와 분리공사 공정계획수립 2) 단열재 등 인화성물질 보관장소와 설비공사 용접작업 분리계획 공정수립 3) 임시소방설비 공통가설항목에 적용

※ 계약체결 후 발주기관이 제공하는 기본안전보건대장 참조

파. 공사 중 산업재해 예방을 위한 설계가 될 수 있도록 아래의 안전보건 조건을 설계에 반영해야 한다.

1) ｢산업안전보건법｣ 제61조 및 ｢중대재해처벌법｣ 제4조에 따른 안전보건 수준평가 대상 사업여부 명시

2) 중대재해처벌법에 제4조 및 제9조에 따라 안전/보건 확보 의무사항 준수

3) 예정가격 작성시 산업안전관리비 반영

4) 안전보건 관계법령에 따른 필요한 관리상의 조치

5) 재해예방을 위해 제출한 「안전보건관리 계획서」보완요청 준수

6) 안전보건관리 이행수준의 평가방법 및 기준 제시

하. 공사 중 산업재해예방을 위하여 아래의 안전보건 조건을 설계안전보건대장에 반영해야 한다.

1) ｢중대재해처벌법｣ 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전보건 확보의무) 등 관련 법령 준수

2) 산업안전보건법의 도급인의 안전보건조치 의무사항 이행

3) 안전보건 관계법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

4) 산업안전보건관리비의 적정 사용 및 실사용 금액으로 정산

5) 안전보건관리계획서 제출 및 이행 적절성 여부 자체점검 및 결과 보고

6) 재해예방을 위해 제출한 「안전보건관리 계획서」 보완요청 준수

7) 안전보건관리 이행수준의 평가방법 및 기준 제시

3. 설계기본방향

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 계약상대자 임의로 판단해서는 안 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신공사 등에 대한 설계는 관련 법령에 의한 제반 규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 에너지 절약을 위하여 고효율 구조물이 되도록 설계에 반영하여야 한다.

1) 설계 시에 부지의 환경조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을   고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

2) 에너지이용합리화법 제3조 (정부와 에너지 사용자·공급자 등의 책무), 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 (산업통상자원부 고시) 및 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 (산업통상자원부 고시)에 의하여 고효율기자재를 사용하여야 한다.

3) 건물자체가 에너지절약적인 건물이 되도록 평면계획(실의배치 등), 입면계획(적정창 면적비 등), 단면계획 (최적 층고계획 등)을 하여야 한다.

라. 설계는 환경친화형 (Green Building System) 건축 설계를 적용하고, 건축물의 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위하여 각종 환경조절 (제어) 시스템과 설비시스템이 최적화  되도록 한다.

1) 수자원의 효율적 활용과 수해방지 등을 위하여 빗물저류조 또는 빗물이용시설 설치 등을 적극 검토한다.

2) 주변 자연환경과의 조화로운 조형성과 자연환기 및 빛을 최대한 고려해야 한다.

3) 저탄소 환경친화적 체험관 구현을 위해 저CO₂소비자재 사용을 고려해야 한다.

마. 계약상대자는 사전조사를 철저히 하여 시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우·오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

바. 주차장은 진·출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한하며, 실내공간은 시설운영변화에 탄력적으로 대응이 용이한 오픈형 공간을 검토하여   반영한다.

아. 그 외 기타사항은 설계공모지침서의 설계지침내용을 포함하며, 심사위원의 의견, 각종 심의 영향평가 인허가 관련 보완사항 및 발주기관의 요구사항을 각 단계별 설계과정에서 발주기관과 협의 후 승인된 내용을 설계에 반영하여야 한다.

4. 설계주요지침

가. 건축계획

1) 일반사항

가) 향토음식진흥센터 고유성 반영

(1) 미래지향적 이미지를 반영하되, 향토음식·문화와 산업의 대표성이 내재된 이미지 반영

(2) 대지주변의 지역적 특성(장소성, 인지성, 접근성, 경관 등)을 고려

나) 다양한 시설특성을 고려하여 가변적 공간 확보를 위한 설계 제안

다) 최적의 전시·체험 환경 제공

(1) 쾌적한 전시·체험공간을 확보하기 위해 주변의 자연환경(자연광, 물, 수목, 바람 등)에서 얻어지는 다양한 환경요소를 유입

(2) 주변의 충분한 자연조건을 활용한 차별화된 공간형성방안을 제시

(3) 각 실의 효율적 배치와 적정 휴게 공간 확보

라) 합리적 시설운영과 환경을 배려하는 지속가능한 시설

(1) 에너지 절약형 선진기법 및 시스템의 채택으로 환경친화적 건축물계획

(2) 유지관리와 시설운영이 편리하고 합리적인 시설 계획

(3) 라이프사이클을 고려한 시설계획(내구성, 가변성, 리모델링 용이성, 확장성 등)

마) 1층은 가급적 오픈 플랜으로 계획할 수 있도록 목적성 공간을 줄이고 공용면적을 최대한 확보하여 가변성 있고 유연한 공간계획 및 많은 사람들이 이용할 수 있는 공간으로 계획한다.

2) 배치계획

가) 본 시설이 입지할 지역의 교통체계와 주변 토지이용계획을 감안하여 배치계획을 수행하며 차량동선, 서비스동선, 보행동선, 주차계획, 옥외공간 활용계획 등이 합리적이고, 경제성을 고려한 시설물 배치가 되도록 한다.

나) 본 시설계획 시에 시설의 용도, 규모 및 입지조건 등을 충분히 파악하여 효율적인 대지의 이용 및 개방감을 확보하도록 하고 설계단계에서 쾌적한 환경조성과 그 쾌적성을 지속화 할 수 있도록 사용 및 유지관리의 편의성에 우선하되, 경사지 절개 등을 최소화하여 친환경적 배치계획을 수립한다.

다) 후정, 중정, 옥상정원 (옥상다목적이벤트공간), 휴게공간 등 옥외공간과 실내공간을 공간적, 시각적 연계하여 환경친화적 공간을 적극적으로 구성하고, 시설활성화를 최대한 도모한다.

라) 입구, 실내진입, 로비 등 모든 곳에는 문턱을 설치하지 않으며, 어린이·장애인·노약자에게 시설 사용의 장애가 없는 장벽제거 (Barrier Free) 환경을 계획한다.

마) 대지 북동쪽 암반단차는 공사 예산 범위 내에서 적절하게 계획․활용하는 방안을 마련하되, 시각적 미화방안도 고려하여 검토하여 제안한다.

바) 대상지의 지형, 부지형태 등에 의한 효율적 대지이용을 고려하고, 각 시설별 유기적인 연계성을 고려하여 배치계획을 하여야 한다.

사) 각 건물간의 관계 (높이, MASS, 균형 등)와 미적 안정성을 고려한다.

아) 주변 현황을 고려하여 자유로운 배치가 가능토록 열린 배치 방안을 고려한다.

자) 옥외공간 계획시 단지의 전체적인 조화를 이루도록 관련 분야별 (건축, 조경, 전기, 토목 등) 긴밀한 협의를 하도록 하여야 한다.

3) 옥외동선계획

가) 주차계획은 관련법을 고려하여 합리적이고 원활하게 계획한다.

나) 이용자의 특성(체험·관람객 등 방문자, 운영 및 관리자 등)을 고려하여 외부공간 구성에 대해서는 자유롭게 제안하되, 각 소요 동선 간의 간섭을 최소화 하도록 하며, 시설 이용자의 편의성·쾌적성 확보와 차량통행의 안전성을 확보한다.

다) 차량과 보행자 동선은 분리를 원칙으로 하고, 바닥턱이 없는 편리하고 안전한 보행자 주출입동선을 확보하여야 한다.

라) 전시관과 체험관의 진입동선은 공공성을 고려하여 개방적이고 용이하게 계획한다.

마) 물품 반·출입 및 유지관리 차량이 접근할 수 있는 주차공간과 하역공간을 적절하게 확보한다.

바) 차량동선 계획 시 비상차량(응급용, 소방용 등)의 부지 내 동선확보가 가능토록 고려한다.

4) 평면계획

가) 평면계획은 주어진 조건을 바탕으로 설계자가 자유롭게 제안하되, 공간의 가변성을 최대화하고 미래 확장 및 변화 가능성을 고려하여 개방형 평면으로 계획한다.

나) 모든 사용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 유니버설 디자인을 공간서비스의 기본개념으로 계획하고, 모든 공간에 장애인의 출입은 관련법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

다) 업무유형별 Zoning, 기능성 등 상호 연계성을 도모할 수 있도록 계획하고, 각 기능별 특성을 살려 공간적으로 특성화할 수 있는 창의적 평면 계획이 되도록 한다.

라) 전시·체험 공간 등 많은 사람들이 방문·이용하는 부분은 혼잡이 발생되지 않도록 명쾌하게 동선을 분리하고, 운영 및 관리자 동선과 가급적 겹치지 않도록 근무자의 편의성과 보안을 고려한다.

마) 교육시설은 강연, 교육, 세미나 등 다양한 커뮤니케이션 방식과 공간구성이 가능하도록 계획한다.

바) 효율적인 공간 활용과 Dead Space를 최소화하고 전용비율이 극대화될 수 있도록 계획하되, 각종 시설물 (전기, 기계실, 방재실 등 설비 및 관리지원시설)의 중앙 집중관리 및 통제시스템이 가능한 평면으로 계획한다.

사) 코어 (Core)를 제외한 주요실의 전용공간은 실내 기둥이 설치되지 않는 개방형 공간으로 계획하여 공간을 효율적이면서 가변적으로 사용할 수 있도록 Module 시스템 (공간 module, 구조 module)을 고려하여 계획한다.

아) 조리체험, 음식체험 과정에서 발생하는 식자재 및 음식 냄새의 확산차단을 위해 환기를 고려하여 계획한다.

자) 평면에는 기본적인 가구의 배치계획을 포함한다.

차) 공용면적(홀, 로비 등)을 적절히 확보하여 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

카) 엘리베이터, 계단, 화장실 등의 배치는 이용자 편의성과 피난안전에 적합하여야 한다.

타) 공용시설은 가급적 외기에 직·간접적으로 노출되어 냉·난방 설비가 필요 없는 경우 자연환기가 가능하게 계획한다.

파) 식자재, 기타 물품과 기계실 및 전기실 장비의 반·출입이 용이하도록 계획하고, 실외기 설치공간을 고려하여야 한다.

5) 입면계획

가) 설계의 기본개념을 부각시킬 수 있는 상징성과 조형미, 주위 환경과의 조화를 고려하고, 향토음식진흥센터 이미지를 부각할 수 있는 입면을 계획한다.

나) 쾌적한 실내 공간 확보가 가능하고, 에너지 낭비적 요소를 최소한 외벽구조를  적용한다.

다) 해안지역에서의 내구성이 우수하고 건물유지관리 및 라이프사이클을 감안한 경제적인 재료를 선택한다.

라) 건축물의 창호는 열손실, 소음 등의 영향을 최소화 하도록 하되, 공기조화설비의 미가동시간에도 충분한 자연 환기를 할 수 있도록 개폐면적을 고려하여 설계한다.

마) 사후관리의 효율성을 고려하고 에너지를 절감할 수 있도록 계획한다.

바) 지나친 디자인 강조로 인해 현지 시공문제 또는 자재수급의 곤란 등이 발생하지 않도록 고려한다.

사) 주위 환경과의 조화를 고려하여 계획한다.

아) 야간경관을 고려하여 입면을 계획한다.

자) 외부 CI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획한다.

차) 해안가 인접 건물인 점을 감안하여 외피재료에 대한 기능적 특성을 고려한다.

카) 외부에 설치되는 경우에 기계설비(PV, EHP 등)는 노출되지 않도록 통합적으로 디자인 할 것

6) 단면계획

가) 토지이용계획, 각 시설의 특성, 외부 공간과의 조화, 이용자의 쾌적성 등을 고려하여 층수, 건물높이 등 수직적 요인을 분석한 후 계획 건물의 층수 및 건물높이를 반영토록 하고, 환경적 요인 (소음, 조망, 음영 등)을 분석하여 쾌적성을 최대한 확보

나) 가급적 건물내부 단차가 생기지 않도록 계획하여 계단 및 구조물 변화 감소로 인한 시공성 향상과 장애인 및 노약자 이용에 불편이 없도록 계획한다.

다) 층고는 전시관 또는 체험관에 필요한 기계설비, 전기설비, 구조시스템 및 유지관리를 고려하여 충분한 천장고를 확보한다.

라) 메인로비, 홀, 지하층 등 공용시설은 가능한 자연채광과 자연환기로 쾌적한 환경을 조성토록 한다.

7) 구조계획

가) 지반조사자료 및 현장주변자료를 활용하여 각종 하중에 저항하기 위한 다양한 구조시스템을 검토 후 경제성이 반영된 최적의 구조시스템으로 계획한다.

나) 구조형식 및 단면의 크기 등은 계획 및 시공성과 안정성을 고려한다.

다) 건축구조, 설비 및 비(非)구조 부재의 종합적인 내진 안전성을 확보할 수 있도록 한다.

라) 중력하중 및 횡하중에 대하여 충분한 내력을 갖추며, 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여 설계하여야 한다.

마) 공사비, 공기의 절감 및 시공성과 안전성이 기대되는 공법을 우선 고려한다.

바) 특수구조이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우에는 시공 안전성, 경제성 등을 비교 검토할 수 있는 자료를 제시하고, 발주처의 승인을 받아야 한다.

8) 내·외장 계획

가) 내장재는 실용도에 적합한 친환경성, 기능성 (안전성), 심미성과 내구성을 고려하여 계획한다.

나) 내장재는 가급적 건식공법을 채택하여 설계하되, 유지보수성을 고려하고, 법적수준 이상의 방염 및 난연 성능이 확보되어야 한다.

다) 외장재는 친환경적이고 주위환경과 조화되며, 유지관리가 용이하고, 화재 및 방수에 강한 자재로 설계한다.

라) 외부 바닥, 현관 입구, 경사로 등은 잘 미끄러지지 않는 재료를 사용하며, 외부로부터 우수 등이 실내로 유입되지 않도록 한다.

마) 환기탑, 환기구 및 환기갤러리는 외기역류 및 우수유입이 없도록 개폐장치, 후드 (Hood) 등을 설치한다.

바) 루프드레인 (Roof Drain)의 수 및 구경은 최대강수량 및 지붕면적 등을 고려하여 여유를 둔다.

9) 친환경계획

가) 친환경적인 개념을 구체적으로 반영하여 패시브 디자인을 적용하고, 에너지 자립률을 최대한 높일 수 있는 건축물이 될 수 있도록 계획한다.

나) 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 및 「에너지이용합리화법」에 따른 「공공기간 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」을 충족시키도록 한다.

다) 에너지효율등급 인증 1++등급이상, 제로에너지건축물 인증 4등급이상을 득한다.

라) 신재생에너지 설치 공급의무비율 34%이상을 고려, 계획안을 제시한다.

마) 건물에너지관리시스템(BEMS)을 적용한다.

바) 「실내공기질관리법」에 따른 다중이용시설이 실내 공기질 유지 기준에 적합하게 설계한다.

사) 옥상녹화 및 투수성 포장 등 친환경기법을 최대한 적용한다.

나. 토목 계획

1) 관련법규 및 제반규정을 준수하여 부지의 입지조건, 토질, 지형, 수리 등을 분석, 건물배치의 방향을 검토하여 합리적인 계획을 수립하며, 부지조성 시 절토 및 성토량을  최소화할 수 있도록 계획한다.

2) 주변 환경과의 친화성 및 연계성을 고려, 환경 친화적으로 계획한다.

3) 대지여건, 지층조건, 공법의 경제성 및 시공성, 굴착심도 등의 제반여건을 종합적으로 파악하여 공법을 선정하고, 공사에 따른 주변 피해 검토 및 예상 문제점 등을 고려하여 적절한 공법을 선정한다.

4) 대지 내의 지하구조물 매설계획 등 이상 유무를 확인하여 필요한 경우에는 보강방법을 제시한다.

5) 굴착 및 발파에 따른 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제조치를 초과하지 않도록 굴착 형식을 선정한다.

6) 구조물 계획 시 건축, 기계, 전기, 통신, 설비공사로 인하여 발생되는 제반 토목시설을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

7) 토목계획은 하부구조를 조성하는 작업으로 시설의 효용성 극대화와 자연환경의 보존 및 경제성을 고려하여 계획한다.

8) 조경, 포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 우·오수 계획, 기타 시설은 환경 친화적으로 계획한다.

다. 조경 계획

1) 기본방향

가) 대지 내 시설물과 조화롭게 종합적인 조경계획을 수립하여 쾌적한 녹지환경이  되도록 설계하여야 한다.

나) 건축법 및 국토교통부 조경기준, 관할 인허가 기관 건축 조례에서 정한 조경의무 면적, 식재수량 등 관련 규정을 준수한다.

다) 건축물 및 조경시설과 어울릴 수 있는 요소를 도입하고, 주차장 등과 연계하여 조경수 및 조경시설물이 주변환경과 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

라) 문화적, 예술적, 정서적 감성을 전달할 수 있는 공간을 조성하고, 건축물의 경직성을 최대한 완화할 수 있는 조경계획을 고려한다.

마) 조경수목과 조경시설의 지속가능한 유지관리성을 고려한다.

바) 반드시 예산 범위 내에서 실현 가능하도록 디자인 및 식재 계획하고, 과도하고 인위적인 외부 지장물 계획을 지양하며, 합리적인 설계안을 제시하여야 한다.

사) 대지의 남쪽 주도로의 기존 식재, 특히 개잎갈나무(히말라야 시다) 2그루를 고려하여 계획한다.

2) 조경수목

가) 조경수는 해당지역의 식생에 적합한 수종을 선정하여야 한다.

나) 기존의 토사가 조경수의 식생에 적합하지 않는 경우에는 토사치환에 의한 유기토로 치환하는 내용을 설계에 반영하여야 한다.

다) 조경수는 성목이 되었을 때를 가정하여 가능한 조경수간의 거리를 확보하여야 한다.

라) 조경수는 하부의 토심이 충분히 확보될 수 있는 지역이어야 한다.

3) 조경시설물

가) 조경시설물은 옥외에 설치되는 점을 감안하여야 하며 공해, 습기, 광선 등에 견디고 구조안정성, 내구성, 이용자의 안전성, 미관 등이 종합적으로 고려되어야 하며, 유지관리 및 보수에 용이 하여야 한다.

나) 조경시설물의 디자인과 설치 위치는 안을 작성 발주기관과 협의하여 결정한다.

다) 준공 표지석 또는 표지판(내역반영), 설치 위치는 안을 작성 발주기관과 협의하여 결정한다.

라) 자동관수시스템을 설치하여야 한다.

마) 외부조성시설 이용 시 장애인, 어린이 및 노약자의 이용에 불편이 없도록 유니버설 디자인 (Universal Design)을 최대한 적용하여 계획한다.

바) 조경관련 시설물 등에 대하여는 위치, 규모, 재료, 수량, 내구성, 질감, 구조 등을 충분히 고려하여 계획ㆍ설계하고 이용자의 휴식 등을 위한 인공구조물을 설치하되, 주변 환경, 시설물 등과 조화를 이루도록 한다.

사) 옥외공간은 그 특성에 맞는 조경요소를 도입하여 적용하되, 대지 전체적인 일관성을 유지한다.

라. 기계설비 계획

1) 일반사항

가) 각 분야 설비는 건축물 용도 및 기능을 고려하고, 에너지 절감, 경제성, 운영성, 유지관리 등을 종합적으로 검토하여 적합한 설비를 적용한다.

※ 주요장비는 설계 전 반드시 발주기관의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

나) 실내공기질 관리법에 근거하여 공기정화설비 및 환경설비를 계획한다.

다) 충분한 자료를 수집하고, 개량된 선진설비 방식과 비교·검토하여 최적안을 설계에 반영토록 한다.

라) 건축·토목·조경 등 타 공사 (공정)와 연관되는 부분을 면밀히 검토하여 설계에 반영하고, 원활한 시공 및 기능을 유지토록 하여야 한다.

마) 각종 법령, 지침, 고시 등 제 규정에 적합하게 계획한다.

2) 쾌적한 실내 환경계획

가) 체험 및 전시시설에 적합한 실내 환경 조성

나) 적정한 온·습도와 깨끗한 공기질이 유지될 수 있는 공조방식 채택

다) 악취, 냄새, 유해가스 등 발생장소에 대한 위생적인 환경의 유지

라) 소음·진동 및 공해방지 계획

3) 경제적인 설비계획

가) 충분한 경제성 검토를 통한 시스템 계획

나) 효율적인 기기사용 및 시스템 선정

다) 반송동력을 절감하는 방식의 혜택

라) 생애주기 비용(LCC)를 고려한 장비 및 자재 선택

4) 편리한 설비계획

가) 설비 기기 및 시스템운영의 중앙 집중화

나) 장비 및 배관 등의 교체 및 보수점검이 용이한 설비 계획

5) 미래변화에 대한 대응성 확보

가) 장래의 변경, 확장 등에 대응이 가능한 모듈설계

나) 추후 리모델링 시 설비교체 및 전환의 용이

다) 용량증가에 따른 각 부하의 증가에 대한 대응성 확보

6) 환경 친화적인 설비계획

가) 기후 등 자연조건을 적절히 이용하여 에너지 절감 최대화

나) 자연에너지 및 에너지 신기술의 적용을 통한 에너지 절감

다) 친환경 설비자재 및 재료의 적용

라) 유해물질 발생을 억제하고 배출로 인한 주변 환경의 오염방지

마. 전기설비 계획

1) 전력, 조명 및 방재설비 등의 설계에 대한 기본적 사항을 기준한 지침으로 변화하는 새로운 기술에 대응하는 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 안전성, 신뢰성, 안정성, 확장성, 보전성, 경제성 등에 중점을 두어 최상의 근무 및 생활환경이 조성될 수 있도록 계획을 수립하여야 한다.

3) 에너지 절약과 환경보존을 목표로 에너지 부하저감, 고효율 에너지 설비, 대체에너지 이용 관련 법규에 적합한 자연 친화적이면서 경제성이 제고될 수 있는 기법을 도입하여 설계하여야 한다.

4) 전기적 사고의 사전예방 및 계통파급에 따른 피해구간을 최소화하도록 계획하고 모든 전기설비는 침수를 대비하여 내부 식성대책을 확보하여야 한다.

5) 전력공급 계획은 약전, 특고인입·통신인입 선로가 중첩되지 않도록 한다.

6) 조명기구는 실내디자인 및 설비 마감과 조화가 되게 한 고효율 LED조명의 사용을 고려한다, 특히 주차장은 에너지 절감을 위하여 디밍 및 스케쥴 제어가 가능하도록 계획하여야 한다.

7) 건축물 외부 마감의 이미지를 고려하여 경관조명을 계획하여야 한다.

8) 향후 장비교체 및 증설을 위한 장비반입 대책이 고려되어야 한다.

9) 전기설비는 필요한 내진대책 (다음 시설 포함)을 조사·반영하여 적정 수준의 내진설계가 되도록 검토 계획한다.

※ 방진행거, 방진고무 부착, 내진 스토퍼 볼트 사용, 이음부 플렉시블 전선관 사용, 제어케이블 여장 (케이블트레이) 등

10) 전산실, 방재시설 등 순간정전에 대비하여야 하는 설비가 있을시 무정전 전원장치 설치를 검토하여야 한다.

11) 사무실 등의 전기, 전화OA설비는 Inner Box를 바닥에 매립하여 필요시 인출하여 사용토록 계획한다.

12) 예비전원설비는 건축 및 소방 비상전원설비 등을 고려하되 원활한 연수진행을 위하여 필요한 곳에 무정전 전원설비를 계획하여야 한다.

13) 전기적 사고의 사전예방 및 계통파급에 따른 피해구간을 최소화하도록 계획하며, 전력설비의 기기 성능이 우수하고 신뢰도가 높은 시스템으로 계획한다.

14) 에너지절약설계기준에 적합하도록 설계하여야 하며, 공공기관 신재생에너지 이용 의무화제도를 충족하도록 계획한다.

바. 정보통신 설비 계획

1) 기본방향

가) 정보통신 설비는 가변성 있는 정보화 시대에 능동적으로 대처할 수 있도록 최신의 정보통신기술을 도입하여 기술적 확장성과 유효성, 편리성, 경제성, 안정성 있는 정보통신 서비스를 제공받을 수 있도록 계획하여야 한다.

나) 정보통신설비 시설은 고도의 사무자동화 등을 수용하고 향후 정보통신설비의 증설이 가능하도록 계획하여야 한다.

다) 미래지향적 환경을 조성함으로써 최신의 서비스와 관리업무 여건을 마련 및 다양한 서비스 제공

라) 최신의 정보통신기술을 탄력적으로 수용하여 기능적으로 소요되는 설비에 대해서는 첨단제품 적용

마) 주차관제설비와 감시카메라(CCTV)설비는 편리한 주차, 사고감시, 사고기록저장, 유지관리 등을 위해 카메라, 센스 등을 활용하여 사각지대가 없도록 계획한다.

바) 정보통신설비 계획은 「접지설비·구내통신·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준」, 「방송 공동수신설비의 설치기준에 관한 고시」, 「방송 통신설비의 기술기준에 관한 규정」 등 관련법규에 따라 설계하여야 한다.

2) 주요설비

가) 빌딩자동화 (BAS)시스템

나) 교환기 설비 (IPX)

다) 통합배선설비

라) 네트워크 (LAN) 설비

마) CATV 설비

바) 전관방송설비

사) 이동통신 설비

아) A/V 설비

자) 통합방범설비 등

사. 소방 설비 계획

1) 건물 각 부분의 구조 및 용도에 따라 화재의 발생, 화재의 확대 및 인명피해를 최소화 할 수 있는 소방설비 구성

2) 최소의 비용으로 최상의 기능을 발휘하는 경제적인 설비 계획

3) 환경 친화적인 청정소화약제 사용

4) 화재의 신속한 발견, 조기 소화, 적극대응 안전한 피난유도에 중점

5. 기타 설계지침

가. 계약상대자는 신·재생에너지 사용 (지열, 태양광, 태양열, 연료전지 등)에 대하여 에너지사용계획서를 작성하여 한국에너지공단과 사전협의 및 승인을 받아야 하며, 사전에 감독기관으로 각종 계획서를 및 제출서류를 제출한다.

나. 계약상대자는 관련 규정 등에 따라 신ㆍ재생에너지로 지열 설계 시 시험천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서 및 계획서를 작성하여 제출한다.

다. 지질조사 공수는 NX 2공이며, 사전에 위치 선정 등 지질조사 지반조사 계획서를 발주기관 담당자에게 제출하여 승인 후 지질조사를 시행한다.

라. 계약상대자는 지하매설물 여부에 대해 관계기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 계획하여 설계에 반영한다.

※ (조사항목) 공공시설물, 전기/통신/상·하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

마. 계약상대자는 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

바. 계약상대자는 사업 대상 부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계한다. (장기침하 검토 포함)

사. 계약상대자는 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영한다.

아. T.B.M (가수준점)을 부지내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다. (현황측량, 경계복원측량 시행)

자. 계약상대자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토·반영한다.

차. 계약상대자는 「건설현장 축중기 설치 지침(국토교통부 훈령 제757호)」에 따라 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영한다.

※ (의무 설치대상) 사토 또는 순성토 운반량이 10,000㎥ 이상인 건설공사

* 10,000㎥ 이하의 현장이라도 발주기관에서 과적의 우려가 있어 설치할 필요가   있다고 판단되는 현장에는 설치 가능

카. 계약상대자는 기초공법 (지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계한다.

※ 공사착공 후 지질조사 분석·보고서의 오류로 설계변경 (예산증액 금액 과다소요, 사업기간 과다연장)이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가 수행함은 물론 고의성, 경중(輕重)을 검토 후 관련법령 (설계자의 책임, 손해배상 등)에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사·분석하여야 한다.

타. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

파. ｢건설공사 품질관리 업무지침｣[별표2]에 따른 가설기자재 시험비용,「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」제15조의5 (임시소방 시설의 종류 및 설치기준 등), ｢건설현장의 화재안전기술기준(NFSC 606)｣ 및 ｢건설현장의 화재안전성능기준(NFSC 606)｣을 검토하여 내역에 반영한다.

하. ｢건설기술 진흥법｣제62조(건설공사의 안전관리), ｢건설기술 진흥법 시행령｣ 제98조(안전관리계획의 수립) 및 제100조(안전점검의 시기·방법 등)를 검토 하여 ｢건설기술 진흥법｣제63조(안전관리비용)에 따른 내역에 PS로 반영한다.

거. 계약상대자는 설계도서를 작성할 때 「건설기술 진흥법」제48조에 따라 구조물(가설구조물 포함)에 대한 구조검토를 최신 개정기준으로 검토하여야 한다. (※거푸집 및 동바리 설계기준(KDS 21 50 00))

너. 발주기관의 감독관실에 비치되는 집기류 등 임대비용은 공사규모/ 공사 기간 별로 적정금액을 내역에 별도 반영하여야 한다.

더. 수급인은 인테리어 설계가 필요한 실에서는 인테리어 설계에 대한 단계별로 발주기관에서 보고 후 승인을 받아야 한다.

※ 인테리어 설계가 필요한 실 : 추후 발주기관과 협의하여 시행

러. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 발주기관의 요구 사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영한다.

6. 단계별 도서제출

가. 공문 제출 (공종별 책임기술자가 ‘확인’한 공사비 배분표 포함)

나. 계약상대자는 각 사업특성에 맞게 표준예정공정표를 기준으로 예정공정표를 작성하여 승인을 득하여 하며, 예정공정표에는 단계별 도서제출일을 지정하고 주요일정을 계획 후 승인을 득하여야 한다.

다. 계약상대자는 단계별 체크리스트를 구체적으로 작성 후 제출하고, 감독관 및 수요기관의 의견을 검토 후 도서에 반영하여 최종 제출도서에 포함한다.

라. 계약상대자는 체크리스트 ‘세부검토내용’을 작성 (구체적 작성, 도면번호, 검토서 포함)하고, 적용사항에 대하여 발주기관과 협의 한다.

7. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정한다.

나. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시한다. (착수계와 비교확인, 경력증명서 신청 시 확인)

다. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 건축, 기계, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

3) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서 (상세도, 전문 시방서 등)를 작성하고 견적 (부가세 및 제경비 포함여부 확인)일 경우 2개 이상 조사한다.

4) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

라. 건축폐기물처리용역 자료 [건설폐기물/혼합폐기물/폐아스팔트폐기물/가연성 폐기물/지정 폐기물(폐석면) 등]는 일반용역, 분리발주가 가능하도록 작성한다. 또한 기타 폐기물(현장조사 등으로 매립폐기물 확인 시 포함) 발생 시 사전 협의하여 처리한다. (생활폐기물은 별도 수요기관에서 처리)

마. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신 등 도면은 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 검토가 가능하도록 한다.

8. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 「(계약예규)용역계약일반조건」제5조에 의한다.

나. 약어 (Abbreviation)를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하고, 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면: A

2) 건축구조도면: S

3) 토목도면: C

4) 조경도면: L

5) 기계설비도면: M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면: E (전기소방 : EF)

7) 통신도면: ET

8) 인테리어도면 : I

9. 도면작성

가. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 하나, 발주기관과 협의하여 A3 규격을  사용할 수 있다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시한다. (착수계와 비교확인, 경력증명서 신청 시 확인)

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등) 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

6) 각 공종별 (건축, 구조, 기계, 조경, 토목, 전기, 통신, 소방) 상세도 작성과 시공 시 주의사항을 시방서와 도면에 작성한다. 공사 진행단계별로 작성하여야 하는 시공 상세도면 목록은 시방서에 명시한다.

7) 공종간의 간섭사항 및 시공에 필요한 주요사항 및 주의사항은 도면에 작성한다.

바. 필요한 경우, 토목설계 시 별도로 진행되는 (소규모)지하안전영향평가용역의 계약상대자와 협조하여 작성한다. (굴토심의, 구조안전심의 관련 등 포함)

10. 관계기관 업무협의

가. 각종 인·허가, 심의, 건축협의 (허가) 신청, 에너지절약계획서 제출, 신재생에너지 설치계획서 제출 등 관계기관과의 공식적 업무 시 관련 자료를 사전에 발주기관과 협의하고, 최종 결과를 문서로 제출한다.

나. 관계기관과의 공식적인 일정은 설계예정공정표에 표기한다.

Ⅲ		설계도서의 작성

1. 기본(공통)사항

가. 설계자는 성과품 작성에 있어 시공 상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하여야 한다.

나. 기본설계 및 실시설계 도서는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 [별표2] ‘건축설계에서의 도서작성’ 기준에 따라 설계도서를 작성하되, 발주기관과 협의하여 부분적으로 항목을 조정할 수 있다.

※ 설계내역서 작성은 최종 설계도면 확정 후 재검토를 실시하여야 하며, 발주기관의   전문가 자문위원회 의뢰 및 검토 결과를 반영하여 제출한다.

다. 건축, 토목, 조경, 기계설비,  전기,  통신 , 소방,  관급자재,  폐기물처리 등 공종별로 분리하고 발주기관과 협의하여 설계도면 및 공사비 등 내역을 작성하여야 한다.

라. 건축물의 규모, 특성, 주변 여건, 공사 난이도, 공사 단계 안전 확보, 공사 시기 등을   종합적으로 고려한 최적의 공정예정표를 작성하여야 한다.

마. 「엔지니어링산업 진흥법」 제27조(설계도서등의 서명날인) 및 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제43조에 따라 모든 설계참여자는 설계도면 및 보고서에 서명 날인하여야 한다.

바. 모든 도면은 CAD System을 이용, 전자화된 형태로 작성하여야 한다.

사. 본 공사에 소요될 주요 자재 중 관급으로 조달·구매하여야 할 주요자재는 관련 법률, 규정 등에 의하되 발주기관과 사전 협의·결정하여야 한다

※ 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 기타 관계법령에 따라 의무사항으로 규정한 필수 품목

아. 설계자는 모든 제출도서 및 성과품의 인쇄를 발주기관과 협의 후 실시한다.

자. 설계도서(시방서)에 다음의 내용을 명시하여야 한다. 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」의 [별표13] ‘내진능력산정기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개하여야 한다.

차. 설계설명서

1) 공통분야 : 공사개요 (위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명 한다.

2) 건축분야 : 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면ㆍ입면ㆍ주요 단면 선정, 구조ㆍ부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 공정계획 및 세부 공사비, 차량, 보행자 동선 등에 관한 동선계획

3) 기계분야 : 주요설비, 냉·온 열원, 도시가스, 환기, 위생 등 기타설비, 친환경 설계내용, 에너지 절감 및 유지관리 등에 관한 사항 및 대책, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

4) 전기분야 : 전력간선, 전등전열 기타 관련 설비, 전기 및 전화설비 공급 방법, 에너지 절감 및 유지관리에 관한 사항 및 대책, 친환경 설계내용, 세부공정 계획, 세부공사비 산정, 친환경 설계내용 등

5) 통신분야 : 통신선로, 방송설비, 감지설비, 세부공정계획, 세부공사비 산정 등

6) 토목분야 : 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 기초공법검토, 골재원 및 사토장 선정, 배수처리계획 (공사중계획 포함), 신기술.신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가

7) 조경분야 : 식재 및 시설물 계획, 옥상조경계획, 수목이식계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획 등

카. 설계도면-일반

1) 설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 작성한다.

2) 설계도면은 한글 (필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성한다.

3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

4) 설계도면에는 주석 (Note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

5) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들 번호 및 도면명을 표기한다.

6) 모든 도면은 CAD 프로그램을 이용하여 작성하고 그 결과를 USB에 담아 제출한다

※ 각 파일은 캐드파일과 일반 범용 그래픽 파일로 변환된 파일을 구분하여 함께 수록한다.

7) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당도면의 내용과 밀접한 관계가 있는 도면의 번호를 수록하여야 한다.

8) 각종 인증에 의해 반영된 사항, 시공 시 특히 유의할 사항은 주석란에 반드시 명기하여야 한다.

2. 계획설계

- 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고, 그에 대한 가능 계획 제시

- 디자인 개념의 설정 및 연관분야 (구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등)의 기본시스템이   검토된 계획안을 발주기관에 제안ㆍ승인

1)  일반사항

가) 계약상대자는 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 발주기관의 승인을 득한 후 계획 설계를 진행한다.

나) 계약상대자는 대지에 대한 측량 실시 및 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고, 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행한다.

다) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인할 경우, 계약상대자는 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

2) 계획설계 (안) 작성 시 포함사항

가) 설계 설명서 (현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요 등)

나) 주변도로망과 건물과의 배치·증축을 포함한 종합배치계획 (Master plan)

다) 대지 내 동선계획, 주차계획 (전체 주차대수 산출근거 포함)

라) 우·오수처리계획

마) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

바) 조경계획

사) 개략공사비 산정내역(공종별 구분)

아) 측량성과도

자) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항

3. 중간설계

*「건축법」제11조(건축허가)제2항에 의한 기본설계도서 포함

- 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토 수행

- 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인 획득

1) 일반사항

가) 계획설계를 기초로 하여 작성하되, 과업지시서 및 수정·보완 지시서에 따라 작성한다.

나) 계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

다) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

라) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

마) 기계, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

바) Utility (기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여  발주기관의 승인을 받는다.

사) 계획설계 완료 시 검토결과에 따른 조치사항을 반영하여 설계한다. 중간설계 완료 시 계획설계 단계의 조치사항을 반영한 도서를 작성한다.

아) 2단계 체크리스트 (중간설계)를 각 공종 감독관과 협의 및 확인 후 작성한다.

2) 설계도서 구성

가) 건축

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

(나) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률,  주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

(다) 현지조사 사항: 국내·외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사·분석·검토 내용 (반영사항 표기)

(라) 사전조사 사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

(마) 개략 공사비 산정

※ 공종별 내역서 및 전체 공사비 예산에 대한 각 공종 공사비 분석표를 작성하고 각 공종 책임기술자 확인(날인) 후 제출한다.

(바) 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

(2) 구조계획서

(가) 설계근거 기준

(나) 구조재료의 성질 및 특성

(다) 제반하중조건에 대한 분석

(라) 각부 구조계획: 골조의 평면, 간 사이 (Span), 층고, 바닥판 구조 등

(마) 구조성능: 단열, 내화, 차음, 진동 등

(바) 지진에 대한 고려사항 등

(3) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

(가) 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

(나) 일반시방서는 수요기관에서 제공하는 ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식으로 작성

(다) 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

(4) 도면종류

(가) 부근 안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

(나) 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

(다) 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

(라) 대지구적도

(마) 건축면적 산출표

(바) 내‧외부 마감표 : 바닥, 내벽, 천정, 외벽, 지붕 등

(사) 각층 평면도: 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척: 1/200정도)

(아) 입면도 (정면 및 측면): 실시설계의 기준이 되는 사항

(자) 단면도 (종횡 2면 이상): 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

(차) 계단 평·단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

(카) 각층 창호 평·입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

(타) 주요 구조부 단면상세도

(파) 기타 실시설계에 기준이 되는 도면

나) 토목

(1) 설계보고서

(가) 공사개요: 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

(나) 계획 및 방침: 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

(다) 사전 조사사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

(라) 시공방법

(마) 개략공사비 산정

(바) 기타 필요한 사항

(2) 구조 및 수리계산서

(가) 구조계산서 (옹벽, 가시설)

(나) 수리계산서

(다) 절(터파기)·성토 사면안정성검토서

(3) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물

(4) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거 등

(5) 도면종류

※ 위치도, 종단면도 및 횡단면도, 평면도, 구조물도 및 부대시설도, 유역산출 면적 표 (반드시 배수와 연계되어야 함) 등

다) 조경

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

(나) 사전 조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

(다) 개략공사비 산정

(라) 기타 필요한 사항

(2) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거, 기타 산출근거 등

(3) 도면종류

(가) 위치도

(나) 조경계획 평면도: 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 기계설비

(1) 설계 설명서 : 설비 대략공사비, 계약상대자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서 (시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교‧검토 후 결정)

(2) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항

※ 발주기관의 지침을 받아 작성

(3) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서 (유사 건물 비교)

(4) 도면종류

(가) 범례 및 도면목록

(나) 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

(다) 배치도 : 상·하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

(라) 계통도 : 공조, 위생, 소화설비, 기타설비의 계통도

(마) 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉·난방배관, 공조덕트, 위생배관 기준층 평면도

(바) 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

(사) 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

(아) 정화조는 각종 법률 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

(자) 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 전기설비

(1) 설계 설명서 : 전기 대략공사비, 계약상대자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서 (시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교‧검토 후 결정)

(2) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항

※ 발주기관의 지침을 받아 작성

(3) 설계계산서 : 용도별 조도, 부하계산서 작성

(4) 도면종류

(가) 범례 및 도면목록

(나) 전기기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

(다) 배치도 : 옥외조명 설비 평면도

(라) 계통도 : 전력, 조명, 통신, 소방, 기타전기의 계통도

(마) 평면도 : 유지보수 공간을 고려한 전기실 평면도, 조명 평면도, 소방 평면도

(바) 상세도 : 조명기구 선정

(사) 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

바) 정보통신

(1) 설계 설명서

(가) 통신설비개요: 각 설비 (통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

(나) 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명: 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항 포함

(다) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

(라) 에너지절감 및 유지관리, 정전 대비방안 등에 관한 고려사항

(마) 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

(2) 계산서

(가) 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

(나) 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), DVR 용량계산서

(다) 케이블 트레이 용량계산서 등

(3) 시방서

※ 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명. 단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시 가능

(4) 도면종류

(가) 현장 안내도 (건축개요, 재료마감표 등)

(나) 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

(다) 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

(라) 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

(마) 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

(바) 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 기타 통신설비의 계통도

(사) 각종 설비의 배치도 : 교환기, MDF, 전관방송, A/V, MATV 등

(아) 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

4. 실시설계

- 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성ㆍ공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정

- 시공 중 조정에 대해서는 사후설계 관리업무 단계에서 수행 방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부 확인 및 최종 설계도서 납품

1) 일반사항

가) 중간설계를 기초로 하여 작성하되, 설계지침서 및 수정‧보완 지시서에 따라 작성한다.

나) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

다) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

라) 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

마) 납품 전에 발주기관이 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.  (검토용 도서 제출일자 발주기관과 협의)

바) 공사에 필요한 설계도서를 작성하며, 아래 사항을 포함한다.

(1) 시설공사 가설계획도, 건축물 내·외부 색채 계획도, 자재견본 등

(2) 각종 계산서 및 검토서, 인증·심의건축허가 (실시계획(변경)인가(필요시)) 관련도서 포함

(3) 가설계획도, 기초 구조도, 토목 흙막이도면을 overlap (도면제출)하여 검토 확인

(4) 최종 도서 제출 전 실시설계검토용 도서 제출

사) 건축, 토목, 조경, 기계, 통신, 소방 등 공종별 및 발주단위별로 내역을 작성한다.

아) 시설공사 계약요청 자료로 공사개요서 (장기계속공사 일 경우 금차분의 예산에 맞게 공사비 예산을 분리하여 작성) 및 관급자재 목록 (운반거리, 조건, 금액, 구분표기), 공사원가계산서를 작성하여 제출한다. 최종 설계금액이 공사비 예산을 초과 할 경우 설계용역 미완으로 간주한다.

자) 건설폐기물처리용역 관련 도서 (건설폐기물, 폐아스콘, 혼합건설폐기물, 지정폐기물 등 각각)는 수량을 검토 (철거물량 확인)한 후 관계법령에 맞게 분리발주가 가능하도록 작성한다. 기타의 폐기물 발생 및 발견 (현장조사) 시 관계법령에 맞게 설계도서를 작성한다. (건설폐기물 수량산출서는 별도로 작성하여 제출)

차) 「건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시」[별지2] 설계안전보건 대장을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

카) 실시설계검토용 도서(내역서 포함)를 정리하여 제출하고 토론회 조치사항은 제출 전 감독기관 및 수요기관 확인 후 최종도서에 반영한다.

타) 3단계 체크리스트 (실시설계)를 각 공종 감독관과 협의 및 확인 후 작성한다.

파) 최종 제작 (USB 첨부) : 계획·중간·실시설계 도서 및 검토·발표자료와 각종 서류, 인증·심의·허가 등 모든 자료와 참여기술자 (책임기술자, 담당자) 연락처를 포함하여 제작한다.

2) 설계도서 구성

가) 건축

(1) 설계설명서

(가) 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

(나) 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

(다) 사전 조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상ㆍ하수도, 도로상황 등 사전 조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

(라) 세부 시공방법

(마) 공사비 산정 (공종별 물량 및 공사비) 요약

(바) 건물 색채 사용계획

* NCS 혹은 Pantone color system 활용 정확한 색채값 표기

(사) 공정계획 (공정표 포함)

(아) 기타 필요한 사항

(2) 구조계획서

(가) 설계 근거기준

(나) 구조재료의 성질 및 특성

(다) 제반 하중조건에 대한 분석

(라) 각부 구조계획

(마) 구조성능: 단열, 내화, 차음, 진동 등

(바) 지진에 대한 고려사항 등

(사) 구조계산서

① 일반사항

② 구조개요

③ 구조설계기준(적용기준 명시)

④ 구조설계기준(SYSTEM)

⑤ 구조재료의 재질 및 강도

⑥ 부재단면 요약

⑦ 구조골조 평면 및 주단면도

⑧ 설계하중 선정

⑨ 구조해석

⑩ 부재설계

⑪ 기초지반 지내력 검토

⑫ 내진, 내풍설계 검토

⑬ 하중분포도(load map) 작성

(3) 시방서

(가) 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

(나) 일반시방서는 수요기관에서 제공하는 ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식으로 작성

(다) 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

(4) 도면종류

부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

조감도 (투시도) : 천연색채 사용 (중간설계 시 제출안 수정)

도면목록표

배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

부분배치도: 상기배치도를 구체적으로 표시

주차장 평면도: 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

구적도

건축면적 산출표

내·외부 마감표: 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

각층 평면도(축척: 1/100정도), 단위 평면도(축척: 1/50정도)

각층 천정평면도: 시공에 필요한 사항 일체

단열 및 방수계획도: 시공에 필요한 사항 일체

지붕 평면도: 시공에 필요한 사항 일체

입면도(4면): 시공에 필요한 사항 일체

주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척: 1/50정도)

계단 평‧단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

각부 구조배근상세도: 시공에 필요한 사항 일체

옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

각부 구조평면도(축척: 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

각층 기둥‧보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

조경시설물 공사계획: 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

건물 색채사용계획 도면

기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평‧입‧단면상세도(축척: 1/50정도)를 작성하여야 한다.

(5) 공사비산출서

※ 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

나) 토목

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

(나) 계획 및 방침: 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

(다) 사전 조사사항: 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상ㆍ하수도 등

(라) 세부시공계획 및 자재사용계획

(마) 세부공정계획

(바) 세부공사비 산정 및 기타 필요한 세부사항

(2) 구조 및 수리계산서

(3) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계 내용에 반영

(4) 시방서

(5) 도면 종류

(가) 위치도

(나) 종단면도 및 횡단면도

(다) 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

(라) 기타 시공에 필요한 사항 일체

(6) 공사비산출서

※ 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

다) 조경

(1) 설계보고서

(가) 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

(나) 사전 조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상·하수도 등

(다) 세부시공계획

(라) 자재사용계획

(마) 세부공정계획

(바) 세부공사비 산정 및 기타 필요한 세부사항

(2) 시방서

(3) 도면 종류

(가) 배치도

(나) 종단면도 및 횡단면도

(다) 평면도

(라) 조경시설물 배치도

(마) 기타 시공에 필요한 사항 일체

(4) 공사비산출서

※ 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

라) 기계설비

(1) 설계 설명서

※ 냉·난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

(2) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

(3) 설계계산서: 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서 (위생, 오‧배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

(4) 도면종류

① 건축 주요부분 평면도, 단면도

② 범례

③ 도면 목록표, 계통도

④ 기계기구 및 장비일람표 (수량, 용량, 시방서, 기타 필요한 사항)

⑤ 배치도 : 옥외평면 (정화조, 공동구 등 전체배치도), 기계실 장비배치도

⑥ 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

⑦ 평면도: 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도

⑧ 단면도: 시공에 필요한 사항 일체

⑨ 옥외 공동구: 관로 및 각종설비 평면도 단면도 (확대도면 포함)

⑩ 기타 필요한 도면

(5) 공사비 산출서

※ 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

마) 전기설비

(1) 설계 설명서

※ 전기설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용 등

(2) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

(3) 설계계산서: 변압기용량계산서, 부하계산서, 조도계산서, 발전기용량계산서 등

(4) 도면종류

① 도면목록표

② 범례

③ 계통도

④ 기계기구 및 장비일람표 (수량, 용량, 시방서, 기타 필요한 사항)

⑤ 배치도 : 전력, 통신, 소방 인입 배치도, 옥외조명 및 옥외전기설비 등

⑥ 계통도 : 전력, 조명, 통신, 소방, 기타전기의 계통도

⑦ 평면도 : 전기실 및 기계실 장비설치 평면도, 전력 조명 통신 방범 소방 방송 설비평면도

⑧ 상세도 : 조명기구 상세도, 설비용 핏트 상세도, 피뢰침 상세도, 접지 설비 상세도, TV안테나 설치 상세도

⑨ 기타 필요한 도면

(5) 공사비 산출서

※ 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

바) 정보통신

(1) 설계 설명서

(가) 통신설비개요 : 각 설비 (통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

(나) 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명: 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항 포함

(다) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

(라) 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

(마) 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

(2) 계산서

(가) 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

(나) 통신실 면적 산출서 (집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

(다) 케이블 트레이 용량계산서 등

(3) 공사시방서 (시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한 권으로 구성)

(가) 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명 (단, KS 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시 가능)

(나) 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기 (단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성 가능)

(4) 도면 종류

① 현장 안내도 (건축개요, 마감표 등)

② 범례 : 사용될 기호

③ 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

④ 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

⑤ 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

⑥ 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타설비의 계통도

⑦ 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS (TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

⑧ 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체 (블록 다이어그램 포함)

⑨ 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑩ 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑪ 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑫ 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑬ 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑭ 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

(5) 공사비산출서

※ 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

사) 소방

(1) 설계설명서

(가) 소방설비개요 : 각 설비(소화, 경보, 피난 설비 등)에 대한 설명

(나) 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명: 자동감지 또는 육안으로 화재발견 시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항 설명

(다) 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

(2) 계산서

(가) 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거

(나) 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

(다) 소화수원량 산출서

(3) 공사시방서 (시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한 권으로 구성)

(가) 자재시방: 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명 (단, KS 등은 해당규격의 번호로 표시 가능)

(나) 특기시방: 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기 (단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성 가능)

(4) 도면종류

① 도면 목록표, 현장 안내도

② 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

③ 배치도 : 전체배치도 (인입, 옥외시설 포함)

④ 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별 작성

⑤ 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

⑥ 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑦ 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑧ 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑨ 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

⑩ 단면도: 시공에 필요한 사항 일체

⑪ 기타 필요한 도면

(5) 공사비산출서

※ 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

Ⅳ		단계별 설계도서 제출목록

1. 계획설계 제출도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	비 고
1	계획설계 제출 공문 및 계획설계 검사원	A4	1	부	-붙임 : 제출설계도서목록
2	계획설계(안)	A4	3	부	-개략적조감도 -개략공사비 검토서 (공종별) 포함 * 도면은 A3반책
3	현장조사보고서	A4	3	부	-유사시설견학보고서 포함
4	법규검토서	A4	3	부	-「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 에너지 관련법령 등 포함
5	공종별 개략공사비검토서	A4	3	부	-공사비 예산에 대한 개략 공사비 검토 -공종별 책임기술자 확인
6	기타 발주기관 요구사항 체크리스트	A4	3	부	-공사비 증액 검토자료 등 (필요 시)

2. 중간설계 제출도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종						비 고
					건축	토목	조경	기계	통신	소방
1	중간설계 제출 공문 및 계획설계 검사원	A4	1	부							-붙임 : 제출설계도서목록
2	중간설계 보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-주요공법, 주요자재 비교검토서 포함
3	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-전 공종 분리
4	내역서 (관급포함)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-각 공종별 예산 분배표 *공종별책임기술자 확인
5	계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-별도 제공양식 특기시방 포함
7	설계보고서	A4	5	부	통합본						-검토, 확인, 반영 설계도서 포함 (도면, 시방서, 내역서, 계산서 등)
8	각종 예비인증 관련 검토서	A4	3	부	통합본						-녹색건축 인증 -건축물 에너지효율인증 -제로에너지건축물 인증 -장애물 없는 생활환경 (BF) 예비인증 -지능형건축물 (필요시) -초고속정보통신건물 (필요시)
9	신재생에너지 설치계획서	A4	3	부	통합본						-문서, 사전 제출
10	조감도										파일만 제출 (실시설계 시 최종 수정)
11	공사예정공정표	A3	3	부	통합본						-국토부 고시 검토내용 포함
12	기타 발주기관 요구사항 체크리스트	A4	3	부	통합본						-계획설계체크리스트 반영사항 포함 -공사비 증액 검토자료 등(필요 시)

※ 건축도면에는 전공종 포함 전체 본을 제본

※ 토목, 조경, 기계, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본

3. 실시설계 제출도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종						비 고
					건축	토목	조경	기계	통신	소방
1	중간설계 제출공문 및 실시설계 검사원	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	종결보고서	A4	3	부	통합본						-사업절차 및 관계기관 각종 협의목록 포함
3	설계설명서	A4	3	부	통합본						-색채계획 포함
4	설계도면	A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-에너지절약계획서 포함 -반접이
		A3	5
5	각종 계산서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서 (도급/관급)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	일위대가/단가산출서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-견적서 포함
9	표준시방서 (국토부)/ 특기시방서/관급시방서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	* 한식진흥원 홈페이지→ 소통광장 → 알림마당→ 공지사항
10	조감도 (중간설계 최종수정)	-	3	부	◯						-A1 이상 (추후협의) -표구포함 (추후협의) -원본 파일 포함
11	공사예정공정표	-	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-공기산출근거 포함 -전공종 포함
12	건축협의(허가)서	-	2	부							-인허가관련 전체문서 포함
13	실시계획인가협조자료 (필요시)	-	2	부
14	공사계약요청 자료	공사원가계산서(총차/금차예산), 관급자재목록, 공사원가계산서(모두excel file), 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등 * 공사개요, 현장설명서 포함
15	공사예정공정표	-	3	부							-공기산출근거 포함
16	현장설명서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
17	에너지 절약 계획서 관련 증빙서류										-인증완료 후 예비인중서 포함 -3부
18	건축물 에너지효율 예비인증, 제로에너지건축물 예비인증을 위한 제출도서 및 최종 인증서
19	장애물 없는 생활환경, 지능형건축물, 초고속정보통신건물 예비인증을 위한 제출도서 및 인증서
20	손해배상보험증권	A4	3	부							-보증기간은 공사완공일 까지 산정
21	설계변경 환류자료 및 하자DB자료 검토서	-	2	부							-한식진흥원 홈페이지 참조
22	기타 발주기관 요구사항, 체크리스트	각 단계별 도서파일 등									-전단계 체크리스트 및 반영사항 포함
23	USB	-	3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	-최종제출도서(계획/중간/실시 전체) -단계별제출자료/서류 일체 -행정서류(심의/인허가)/회의록/보고서/발표자료 일체

가. 설계도서 (도면, 시방서, 계산서, 내역서, 지반조사보고서 등)

1) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의한 시설물관리대장을 FMS 등록을 위해 ‘시설물통합정보관리체계 운영규정’의 제출형식, 구성파일 및 색인파일 내용 등에 따라 제출한다.

2) 「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」에 의한 건축물대장용 도면을 작성하여 제출한다.

3) 내역서 (일위대가표, 단가산출서 포함)는 EMS프로그램 등 상용프로그램을 사용하되 EXCEL프로그램으로 변환·작성하여 USB로 제출하고, 프로그램에 대하여 발주기관과 수시 협의한다.

나. 종결보고서 - 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약현황, 용역진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정ㆍ보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재의 선정사유 및 색채에 대한 의견, 납품설계도서목록 등을 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여 제출한다.

다. 공사예정공정표

1) 공사예정공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고, PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사물량에 맞게 정확하게 작성하여 제출한다. (출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 원본 파일은 제출용 USB에 포함)

2) 각 공종간의 간섭사항을 검토 후 공정계획을 수립 및 공사기간을 산정 (절대공기, 근로기준법 개정사항 반영)하고 공사량과 주변 현장 환경에 맞게 작성하여 제출한다.

3) 공사비 예산배정 현황 또한 고려하며, 지열공사와 같이 별도의 관급 (수의)계약으로 진행되는 공종은 그 책임기술자에게 확인을 받아 공정표에 산입하여 주공종에 간섭이 발생하지 않도록 한다.

라. 현장설명서

1) 공사개요서는 수요기관의 총공사비 예산 및 당해 연도 공사비 예산 (장기계속계약)을 구분하여 작성하되, 건축, 통신, 소방, 폐기물, 기타 예산을 예정공정표를 근거로 금차공사기간 및 금차공사금액을 추정 산출한다.

2) 현장설명서는 한식진흥원 홈페이지에 게재된 기본양식을 기준으로 작성하되, 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 작성하여야 하며, 관급자재 선정내용 등을 정확히 기재하여야 한다.

마. 건축물 에너지효율 및 제로에너지건축물 예비인증서, 장애물 없는 생활환경 예비인증서 - 협의시점까지 해당 인증기관 접수증 등으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 설계용역비 중

일부 (인증관련 업무대가 또는 합의금)의 지급 유보 가능

바. 설계변경 환류자료 및 하자DB자료 - 한식진흥원 홈페이지에서 양식 및 자료 별도 송부

사. USB 저장방법

1) 저장파일은 과업 전체과정의 서류, 보고서, 자료 및 도서를 대상으로 한다.

2) 저장파일의 용량이 다수의 USB가 필요하거나 저장목록과 파일형식의 변경이 필요한 경우, 계약상대자는 발주기관과 협의하여 분류방식을 변경할 수 있다.

3) 디렉토리 구성

가) 저장목록 디렉토리

(1) 향토음식진흥센터 제출도서목록.pdf 파일 저장

- 공사명 / 발주기관

- 설계사무소명 / 대표자명

- 설계담당자 / 전화번호

- 납품일자

- 저장목록 (디렉토리명 / 파일명.확장자)

나) 진행단계 디렉토리 - 계획설계단계, 중간설계단계, 실시설계단계로 구별

(1) 문서 디렉토리 – 저장파일은 각종 서류 (공문, 회의록 등), 보고서, 검토서, 설계자료 명칭 + 날짜로 구별

(2) 행정서류 디렉토리 - 저장파일은 각종 심의, 인허가 관련서류 명칭 + 날짜로 구별

(3) 도서 디렉토리

(가) 공종 디렉토리 - 건축, 토목, 기계설비, 조경, 소방, 전기, 통신 등으로 구분

a. 도서 디렉토리 - 도면, 시방서, 계산서, 내역서로 구분

a) 도면 – 저장파일은 도면번호 도면명.dwg, 도면번호 도면명.dxf, 도면번호 도면명.pdf로 구별하고, 하위 글자폰트 디렉토리에 CAD 폰트파일 저장

b) 각종서류 – 서류명으로 구별

Ⅴ		서식

[서식 1] 청렴서약서

[서식 2] 보안각서

[서식 3] 책임기술자 선임계

[서식 4] 하도급 계약 승인신청서

[서식 4-1] 하도급 신청 자기섬토서

[서식 5] 분야별 참여 기술자 명단

[서식 6] 설계용역 주간보고

[서식 7] 설계용역 월간보고

[서식 8] (계획, 중간, 실시) 설계 검사원

[서식 9] 특정자재 설계목록

[서식 1]

청 렴 서 약 서

1. 용  역  명:                                           설계용역

2. 계약상대자:

당 사는 위 공사의 설계에 반영되는 관급자재 선정을 위한 심의(안) 작성에 있어 관계 법령 등에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명하게 관급자재가 선정될 수 있도록 최선을 다할 것이며, 설계용역  수행과정에서 관급자재를 납품하고자 희망하는 업체에게 어떠한 금품·향응이나 부당한 이익을 제공받지 않을 것을 확약합니다.

만약 이를 위반할 시에는 어떠한 처벌이나 불이익 조치도 감수하겠으며, 한식진흥원의 조치와 관련하여 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20  년    월     일

주        소:

상   호   명:

대   표   자:                   (인)

한식진흥원 이사장 귀하

[서식 2]

보 안 각 서

1. 용  역  명:                                           설계용역

2. 계약  일자: 20 .   .   .

3. 착수  일자: 20 .   .   .

4. 완수예정일  20 .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조 (기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 국가계약법 시행령 제14조 제2항 내지 제3항에 해당하는 입찰관련서류의 열람 또는 교부를 위하여 발주기관이 전자조달시스템에 설계용역계약의 계약목적물인 설계서를 게재할 수 있다는 데에 동의한다.

4. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조 (업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

5. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극   협력한다.

6. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 지식재산권은 용역계약일반조건 제35조의2 (계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따른다.

20  년    월     일

주        소:

생 년  월 일:

기 술  분 야: 참여공종 표기

성        명:                   (인)

한식진흥원 이사장 귀하

[서식 3]

책임기술자 선임계

1. 용  역  명:                             설계용역

2. 계약  금액:

3. 계약  일자: 20 .   .   .

4. 착수  일자: 20 .   .   .

5. 완수예정일: 20 .   .   .

-  아     래  -

가. 성       명:

나. 주       소:

다. 생 년 월 일:

라. 기술자격(면허)종별:

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  년    월     일

계 약 자

주    소:

상    호:

대 표 자:                  (인)

한식진흥원 이사장 귀하

※ 공동(분담)수급일 경우 대표사 선임계 제출

※ 하도급 예정공종은 하도급 승인요청 시 제출

[서식 4]

■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별지 제32호 서식]
하도급 계약 승인신청서
1. 건설기술용역명
2. 건설기술용역개요
수급인 (대표회사)	상호		대표자	김 동 훈	소재지
3. 건설기술용역개요
계약금액		계약일		준공예정일
금 차 계약금액		금 차 계약일		금 차 준공예정일
4. 공종별 하도급 예정계획(해당연도)
하도급할 주요 공종	하도급 대상자	하도급 용역
공 종	상호 대표자/분야별책임기술자	소재지	등록업종 (보유면허)	하도급 금액 (VAT 포함)
①하도급 부분금액(A)	②하도급 계약금액(B)	③하도급율 (B/A)
구조		서울		-		-
기계		서울		-		-
토목		경기		-		-
조경		서울		-		-
통신		경기		-		-
「건설기술 진흥법」 제35조제4항 및 같은 법 시행규칙 제31조제1항에 따라 하도급 계약 승인신청서를 제출합니다.
20 년 월 일
수급체	대 표	상 호:
대표자:
한식진흥원 이사장 귀하
첨부서류	1. 하도급 예정 공정표(착수계 설계용역예정공정표로 갈음함) 2. 하도급 승인요청서, 하도급 계약서, 참여기술자 명단 ,자기검토서, 분야별 책임기술자 선임계, 보안각서, 관계서류
1. ①란의 하도급 부분금액은 당해 하도급하고자 하는 용역부분에 해당하는 도급금액으로 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료 및 부가가치세 등을 포함한 금액을 말합니다. 2. ②란의 하도급 계약금액은 수급인이 하도급 대상자(하수급인)와 하도급계약을 맺으면서 지급하기로 계약한 금액을 말합니다. 3. ③란의 하도급율은 하도급계약금액을 하도급부분금액으로 나눈 비율을 말합니다. 4. ①하도급부분금액 및 ③하도급율은 산출이 곤란한 경우에는 기재하지 않습니다.

[서식 4-1]

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보) 일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서				이상 없음
사업자등록증			별첨			제출
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업 진흥법 제2조 엔지니어링산업 진흥법 시행령 제3조(엔지니어링기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술 진흥법
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술 진흥법 소방시설공사업법 제2조 별표1	참여기술자 모두 표기				기술자등급표기
하도급금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등 건설산업기본법 시행규칙
하도급 사유		건축법 시행령 제91조의3 국가기관용 건설기술(설계)용역계약 특수조건 제5조(하도급 승인)

[서식 5]

분야별 참여 기술자 명단

○ 용 역 명 :

○ 용역기간 :  20  년  월  일 (착공) ～ 20 년  월  일 (준공)

○ 발주기관 :

분 야		소 속	회사내 직 위	직책	성 명	생년월일 (기술인협회 등록번호)	참여기간	용역 과업수행내용	자격종목 및 등록번호	날인
책임기술자
참여 기술자

<주>

․ 분야 : 1. 엔지니어링산업 진흥법 시행령 [별표1]의 전문분야에 열거된 분야

2. 주요구조물에 대하여는 상기외에 별도책임기술자로 하여금 수행할 시는 구조물명이나 공사명으로 분야를 기재

(예 : 교량, 부두, 하수처리장의 처리시설)

․ 직책 : 분야별에서 수행시의 책임정도로써 책임기술자(PM) 분야별 책임기술자, 참여기술자로만 분류

․ 자격종목 : 국가기술자격법상의 자격을 기재하고 하단에 등록번호를 기재

․ 수행내용기재 : 분야별 책임기술자중심으로 주요시설물에 대한 수행한 핵심공법을 파악할 수 있도록 기재, 향후 책임한계를 명확히 할 수 있도록 과업지시서상의 업무내용을 위주로 상세하게 작성

[서식 6]

설계용역 주간보고

□ 용  역  명:                            설계용역

□ 용역  개요

◦현장 위치:

◦용역 기간: 20  년  월  일 ∼ 20  년  월  일

□ 용역진행사항

구 분		이번 주 진행사항(~20 . . .)			다음 주 예정사항(~20 . . .)			비 고
업무내용		- 세부적으로 작성 ※ 중간설계 이후부터 공종별로 세부 작성 ※ 관련기관 협의 시 일시, 담당자, 연락처 등 기록 ※ 각종 협의사항 기록			※ 예정일정 기록
특이사항		문제점 및 해결책 등 표기
공정률		계획	실적	대비	계획	실적	대비
	현행	%	%	%	%	-	-
	누적	%	%	%	%	-	-

주    소:

상    호:

대 표 자:

사업책임기술자:                (인)

한식진흥원 이사장 귀하

[서식 7]

설계용역 월간보고

□ 용  역  명:                         설계용역

□ 용역  개요

◦현장 위치:

◦용역 기간: 20  년  월  일 ∼ 20  년  월  일

□ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ∼ 20 . . .)	비 고
첫째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
둘째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
셋째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
넷째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
다섯째 주		계획 %(누적 %) 실적 %(누적 %)
다음 달	- 공정지연 시 : 지연의 구체적 원인 표기. - 중간설계 시부터 공종별로 세부적으로 작성.	이번달 계획 % (누적 %) 실적 % (누적 %)

주    소:

상    호:

대 표 자:

사업책임기술자:                (인)

한식진흥원 이사장 귀하

[서식 8]

(계획, 중간, 실시) 설계 검사원

1. 용  역  명:                        설계용역

2. 계약  금액:           원 (금차 :        원)

3. 계약  일자: 20  .   .   .

4. 착수  일자: 20  .   .   .

5. 완수예정일: 20  .   .   .

6. 규      모: 연면적         층수            공사비

붙임 : 제출설계도서 목록  1부

실시설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  년  월   일

계 약 자:

주    소:

상    호:

대 표 자:                        (인)

한식진흥원 이사장 귀하

[서식 9]

특정자재 설계목록

공 종	품 목	규 격	수량	금액(천 원)	협의 담당자	연락처	비 고

사업책임기술자                     확인

※ 1. 관급자재 제외

2. 품목당 100만 원 미만 제외 (자재리스트에 포함)