- 상당 청소년 문화의 집 건립사업 건축설계용역 -

설 계 공 모 지 침 서

2025. 3.

	청년정책담당관

목   차

■ 설계공모 규정	3

Ⅰ. 설계공모 개요	3

Ⅱ. 설계공모 일정 및 방법	8

Ⅲ. 설계공모안의 작성 및 제출	11

Ⅳ. 작품 심사 및 당선작 선정	14

Ⅴ. 당선 이후	20

Ⅵ. 설계 지침	23

■ 서 식	41

■ 설계공모 규정

Ⅰ. 설계 공모개요

1. 공 고 명 : 『상당 청소년 문화의 집 건립사업 건축설계 공모』

2. 설계공모 목적

가. 「상당 청소년 문화의 집」을 위한 설계 공모를 통하여 다수의 참여자에게 기회를 제공하고, 공정한 경쟁을 통해 가장 적합하고 우수한 설계를 선정하고자 함.

나. 청소년의 균형있는 성장을 도모하고, 수요자 욕구에 부합하는 공공서비스 기반 조성을 통해 청소년이 행복한 도시를 구현하기 위함

다. 청소년이 다양한 문화체험, 동아리 활동 공간으로 이용 가능한 시설배치와 다목적 공간에 도서, 게임, 스포츠 등 설치 공간 마련 및 옥상 공간을 활용한 정원조성 및 프로그램 운영 등의 청소년들의 요구에 따른 맞춤형 이용 공간 조성하여 청소년들의 여가시간을 건전하게 활용하고, 교류를 통해 또래간 네트워크를 형성할 수 있는 공간을 조성하기 위함

라. 생활밀착형 청소년문화의집 건립을 통해 청소년들에게 놀이 문화공간 및 다양한 프로그램 제공

3. 사업개요

가. 사 업 명 :「상당 청소년 문화의 집 건립사업」

나. 발주기관 : 청주시 (청년정책 담당관)

다. 위    치 : 충청북도 청주시 상당구 금천동 327-2 일부

라. 대지면적 : 7,367㎡

마. 지역지구 : 도시지역, 자연녹지지역, 지구단위계획구역(용암2택지개발지구), 기타공원시설(녹지)(저촉), 기타청소년수련시설(저촉), 중로1류(폭 20m~25m)(접함), 체육공원(저촉)

그림. 현황대지 영역

바. 건축용도 : 수련시설 중 생활수련시설(청소년문화의 집)

사. 계획규모 (건폐율: 20%, 용적률: 100%)

1) 규   모 : 3층이하, 연면적 1,578.00㎡ 내외 (3% 범위 내 조정가능)

※ 다음은 예시안으로 설계자가 자유롭게 제안 가능

※ 39p 스페이스프로그램(안)을 참고하여 적정하게 계획

※ 실별 면적은 실별 특성을 고려하여 적정하게 계획

구분		시설기준	비고
개별기준		공통기준 나. 단위시설‧설비기준 1) 및 5)부터 7)까지에 해당하는 시설 중 두 종류 이상을 갖추어야 한다.
활동 시설	공통기준 나. 1) 실내집회장	가) 강당·회의실 등으로서 개별기준에서 정한 집회장 수용인원이 150명 이하인 경우에는 150제곱미터, 150명을 초과하는 경우에는 초과하는 1명마다 0.8제곱미터를 더한 면적 이상의 면적이어야 하며, 그 면적의 합계가 800제곱미터를 초과하는 경우에는 800제곱미터로 할 수 있다.
	공통기준 나. 5) 특성화 수련활동장	가) 문화적 감성 함양 활동장 : 극장, 공연장, 음악감상실, 전시장 그 밖에 이와 유사한 것 나) 과학 및 정보화능력 함양활동장 : 컴퓨터실, 과학실습·자연관찰·천체관측시설, 요리실습시설, 어류·조수사육장 그 밖에 이와 유사한 것 다) 봉사와 협력정신 함양활동장 : 자원봉사정보 및 활용센터, 자원봉사체험 연계네트워크 그 밖에 이와 유사한 것 라) 모험심과 개척정신 함양활동장 : 탐험시설, 수상·해양·항공훈련시설, 영농시설, 산악자전거장, 개척물설치훈련장, 암벽등반시설 그 밖에 이와 유사한 것 마) 전문적 직업능력 함양활동장 : 취업정보센터, 직업교육용시설 그 밖에 이와 유사한 것 바) 국제감각 함양활동장 : 국제교류관(국제회의실·접견실·회의실·친선교류실 등), 학습·정보관(청소년 교육정보센터 등), 어학실습실 그 밖에 이와 유사한 것 사) 그 밖의 특성화활동장 : 가)부터 바)까지에서 규정한 분야 외의 환경의식 함양 등 특성화된 수련활동을 실시할 수 있는 활동장
	공통기준 나. 6) 자치활동실	동아리활동·분임토의 등에 이용되는 시설로서 의자·탁자 등을 갖추어야 한다
	공통기준 나. 7) 강의실	가) 1실당 면적 : 50제곱미터 이상 나) 칠판·교탁·책상·걸상 등과 그 밖에 필요한 기구·설비를 갖추어야 한다. 다) 책상면과 흑판면의 조도가 150럭스(lux) 이상
휴게시설		별도로 설치하거나 실내공간 또는 마당을 청소년의 휴식 및 대화장소로 제공할 수 있는 구조로 배치하여야 한다.
위생시설		수용정원에 적합한 화장실 및 세면장 등을 설치
기타시설		물품보관시설을 설치하거나 물품보관함을 비치하여야 한다.
수용정원		활동시설(실내시설에 한정한다)을 일시에 사용할 수 있는 적정인원을 말한다.

※ 청소년방과후아카데미

구분	시설기준	비고
전용공간(교실)	30명반 : 1개 교실 40명반 : 2개 교실 60명반 : 3개 교실	- 지하층배제 - 환기 원활
지도자실	사무 및 연구/회의 및 상담/기자재 보관 공간 청소년 전용공간과 동일 층 배치 권장	※ 청소년지도사 3명
활동실	수련시설 내 공간 활용을 기본으로 하되 지역사회 내 공간연계 활용
북카페 및 휴게실	참여 청소년들이 도서와 정보를 쉽게 접할 수 있는 공간으로 구성
※ 참여 청소년의 장애유형을 고려한 시설 보완 권장

2) 건물규모는 설계과정에서 청주시(이하 “발주기관”이라 한다)와 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 협의하여 조정될 수 있다.

아. 추정공사비 : 6,466,670 천원(부가가치세 포함)

1) 제시된 공사비는 건축, 인테리어, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 주차장, 폐기물 등에 대한 전체 공사비이며 건축협의 및 관련법에 따른 각종 인증, 신·재생에너지 설치 등 행정절차에 필요한 자료작성 제반업무를 포함함

2) 각종 분담금(상ㆍ하수도, 전기, 가스, 폐기물 등)에 대하여 사전조사를 실시하여 해당금액을 원가계산서에 별도표시 하여야 하며, 발주기관이 부담하는 것으로 한다.

자. 설계용역비 : 318,000 천원

(VAT, 손해배상보험료 포함)

1) 각종 인‧허가, 심의, 인증(예비) 수행비용 일체 포함

* BF예비인증, 설계안정성검토비 포함(단, 접수수수료는 발주기관이 부담)
2) 본 설계비에는 에너지효율등급/제로에너지 건축물(5등급) 수행 포함

3) 손해배상공제증권 비용 포함

차. 공모기간 : 설계공고일로부터 60일간(공휴일 포함)

타. 설계기간 : 착수일로부터 180일(공휴일 포함)

4. 설계공모 방식 : 일반설계공모

5. 설계공모 참가자 자격

가. 「건축사법」제7조 규정에 의한 건축사 면허를 소지하고,「같은 법」 제23조 규정에 의한 건축사사무소 등록을 필한 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

나. 「건축사법 시행령」제21조의2 규정에 의한 외국인 건축사 자격을 취득한 자로서 국내 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여 가능한자(단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨)

다. 공동응모 시 공동응모자 모두 “가” 또는 “나”항의 자격조건을 갖추어야 하며, 이 경우 대표자 1인을 선정하여야 함

라. 응모신청 등록일을 기준으로 해당 관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음

- 응모신청서 등록 시 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 업무정지 중이 아님을 증빙하는 서류를 제출하여야 한다.(공동응모자 포함)

마. 현장설명에 참여한 업체에 한하여 공모안 제출 권한이 있으며, 설계공모 참가자는 1개의 공모안만 제출가능(현장설명 불참업체는 공모안 제출 권한이 없음)

※ 공동응모의 경우 현장참석은 응모업체 중 1개 이상이 참여한 경우 유효함

바. 응모자가 2개 업체일 경우 [서식4] 설계공모 참여자 명단과 공동수급협정서[예규 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제7장(공동계약운영요령 별첨 1, 별첨 2)를 참조]를 첨부한다.

사. 공모응모에 따른 책임과 권리사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률, 건설기술진흥법 및 지방자치단체 계약예규 등 관련 규정에 따름

아. 당선자는 계약 시 기계, 전기, 정보통신, 소방 설계에 의한 자격이 없는 경우 아래의 업체와 공동계약(분담이행방식)을 체결하여야 하며, 이 경우 당선자가 대표자가 되어야 함.

1) 정보통신 및 기계분야은 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의한 정보통신(정보통신), 기계(설비) 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 동 분야의 기술사사무소를 등록한 업체

2) 전기분야는 「전력기술관리법」제14조에 의한 설계업(종합설계 또는 전문설계1종)으로 등록을 필한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사사무소(건축전기설비)를 개설 등록한 업체

3) 소방분야는 소방시설공사업법 제4조의 규정에 의하여 전문소방시설설계업 또는 일반소방시설설계업(기계 및 전기 모두 등록)으로 등록한 업체

Ⅱ. 설계 공모 일정 및 방법

1. 설계공모 추진일정

구 분	일 시	유 의 사 항
사전규격공개	2025. 3. 24.(월)	ㆍ나라장터(g2b.go.kr)
설계공모 시행공고	2025. 4. 1.(화)	ㆍ시행 공고 시 심사위원 공개(예비위원 포함) - 청주시청 홈페이지 - 청주시청 홈페이지, 나라장터(g2b.go.kr)
설계공모 참가등록	2025. 4. 8.(화) 09:00 ~ 15:00	ㆍ이메일접수 – park4563@korea.kr ㆍ접수사실 및 수신여부를 반드시 확인하여야 함 (☎043-201-2582)
현장설명회	2025. 4. 8.(화) 16:00 ~	ㆍ장소 : 상당구 금천동 327-2번지 ※ 미개최 또는 변경 시 개별 통지 ㆍ관련 자료 송부로 대체 할 수 있음
질의접수	2025. 4. 11.(금) 18:00까지	ㆍ메일접수(park4563@korea.kr)
질의회신	2025. 4. 18.(금)	ㆍ청주시 홈페이지 공지사항란 일괄기재
작품접수	2025. 5. 30.(금) 09:00 ~ 16:00	- 방문 접수 ※ 장 소 : 청주시청 공공시설과 ※ 대 상 : 응모접수 및 현장설명회 참석한 자
작품심사	2025. 6. 9.(월)	ㆍ일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우에는 별도통보

※ 상기일정은 청주시의 사정에 따라 변경 될 수 있으며, 변경된 일정은 청주시 홈페이지 (http://www.cheongju.go.kr/)에 게시

2. 설계공모 응모신청서 등록

가. 접수방법 : 이메일접수(park4563@korea.kr)

(접수사실을 반드시 확인하여야 함, 전화 043-201-2582)

나. 접수기간 : 2025. 4. 8.(화) 15:00까지

다. 구비서류 :

1) 응모신청서［서식1］ 1부.(접수번호 및 접수인은 공란 제출)

2) 청렴서약서［서식2］ 1부.

3) 건축사면허증 사본 1부.(외국건축사 참여 시: 국외 건축사자격증 사본)

4) 건축사사무소등록증 사본 1부.(법인인 경우 대표자 등록증 사본)

5) 대표자 선임계 및 공동응모 협정서［서식3, 4］

6) 위임장［서식5］ 및 재직증명서 1부.(대리인이 등록할 경우에 한함)

7) 법인등기부 등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 1부. (외국건축사의 경우 건축사법 시행규칙 제12조의2에 의한 외국 건축사자격취득자 신고필증 사본으로 갈음)

8) 사용인감계 및 인감증명서［서식6］(법인의 경우 법인 인감) 각 1부.

9) 설계공모 참여자 명단 1부.［서식7］

※ 영문 및 외국어로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역업체의 확인서를 받아 제출

※ 건축설계공모의 운영에 대해서는 건축설계공모 운영지침(국토교통부)을 따른다.

3. 현장설명

가. 일    시 : 2025. 4. 8.(화) 16:00

나. 장    소 : 청주시 상당구 금천동 327-2번지 일원

다. 참가자격 : 대표자로서 건축사면허사본 1부 지참

(위임받은 자가 참석할 경우 위임장 및 재직증명서 제출)

라. 내    용 : 설계공모 지침의 주요내용 및 현지 대지조건 등 설명

마. 기   타 : 응모자는 현장  설계지침서 및 관련 자료를 지참하고 참석 하여야 하며, 현장 설명에 참여하지 않을 경우 현상공모에 참여할 수 없다.

4. 질의회신

가. 접수방법 : 이메일접수(park4563@korea.kr)

(접수사실을 반드시 확인하여야 함, 전화 043-201-2582)

나. 접수기간 : 2025. 4. 11.(금) 18:00 까지

다. 질의방법 : ［서식8］에 의한 메일로 제출한 것에 한함

※ 접수사실 및 수신여부를 반드시 전화 등으로 확인

라. 질의회신 : 2025. 4. 18.(금)

1) 질의서에 대한 답변사항은 본 설계공모의 지침서와 동일한 효력을 가짐.

2) 청주시 홈페이지(시정소식-공지사항)에 일괄 게재하며, 개별회신은 하지 않음.

3) 질의회신 내용이「설계공모지침서」등 기존에 제시한 내용과 상이한 경우 질의회신 내용을 우선 적용

마. 유의사항

1) 질의는 지정된 질의 접수기한에 한하며, 질의자의 회사명, 주소, 응모 대표자 성명, 전화번호 등을 기재하여야 함

2) 공동응모의 경우 대표자를 통하여 질의하여야 함

바. 설계공모 기간 중 발생하는 자료나 정보는 청주시 홈페이지(시정소식_공지사항)에 게재할 예정이므로, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있으며, 미확인으로 인하여 발생하는 책임은 참가자에게 있다.

Ⅲ. 설계 공모안의 작성 및 제출

1. 공모안 제출 및 접수

가. 제출요령

1) 제출기한 : 2025. 5. 30. (금) 09:00 ∼ 16:00

2) 응모등록 및 현장설명회 참석을 필한 업체로서 응모작 제출은 청주시 주택국 공공시설과에 접수하여야 한다.

3) 응모작은 제출기간 마감시간까지 직접 제출해야 하며, 추가제출·수정·변경·보완할 수 없다.

4) 각 응모자는 1개의 응모안 만을 제출할 수 있다.

5) 제출도서는 심사용과 보관용을 구분, 포장하여 제출한다.

6) 심사용과 보관용 제출도서는 각각 하나의 묶음으로 파손되지 않도록 이중 포장 후 봉인하고 겉포장에 응모신청서 상의 접수번호와 제출도서 제목 및 심사용, 보관용 구분을 표기하며, 모든 도서류에는 규정에 의한 것 이외의 표시를 금한다.

나. 비용부담 : 응모신청서류 작성 및 제출 성과물 등에 관계되는 모든 비용은 응모자 부담으로 한다.

다. 제출도서 작성기준

1) 제출도서 등의 종류 및 규격, 부수

① 설계공모 참여신청서[서식 9] 1부.

② 설계 설명서

- A3: 420㎜(가로) × 297㎜(세로), 12쪽 이내, 15부.

③ 설계도서 수록 USB 1개.

④ 입상작 확인용 서류(서식 15, 16) 1부.

2) 공통사항

① 제출도서는 심사위원이 해당 설계공모안의 내용을 이해하고 평가하도록 국토교통부 고시 『건축물의 설계도서 작성기준』등 관련기준에 따라 적정하게 작성하도록 해야 한다.

② 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하며, 제본은 스프링, 클립 등의 사용이 불가하며, 무선 무철로 접착제 제본만 가능하다.

③ 조감도 및 설계도면, 그 외 설계의도 등 컬러 사용이 가능하나, 조감도에는 응모자를 식별할 수 있는 설계 문구나 이미지 등이 포함되지 않도록 해야 한다.

④ 방위는 각 도면의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

⑤ 쪽 번호는 표지 및 목차에는 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단 중앙에 “-1-”부터 표기한다.

⑥ 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표현할 것, 셋째자리 반올림)을 사용한다. 단 부득이하게 영문, 한문 등 다른 표기가 필요한 경우 ( )속에 넣어서 명기할 수 있다.

⑦ 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

⑧ 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

⑨ 모든 도서에는 색채 표현 및 3D 표현은 가능하며, 조감도 및 투시도에는 랜더링 작업은 불허한다. (랜더링 작업 제출 시 심사위원회에 상정하여 실격처리 할 수 있다.)

⑩ 심사용 제출도서 : 설계도면 및 설계설명서 14부, 설계도서 수록 USB 1개, 참여신청서 1부를 개별로 포장하여 제출한다.

⑪ 보관용 제출도서 : 설계도면 및 설계설명서 1부와 입상작 확인용 서류를 함께 포장하여 제출한다.

⑫ 작품접수는 제출마감일 16:00까지이며, 설계공모 응모신청 및 현장 설명회 참석을 필한 업체의 작품에 한하여 접수한다.

⑬ 작성요령을 위반할 경우 감점기준에 따라 감점 처리된다.

⑭ 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인 외에 어떠한 형태도 허용되지 않으며, 특히 제본된 도서의 측면에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 한다.

⑮ 대지면적, 시설용지 등을 사실과 다르게 임의 조정 시에는 심사위원회에 상정하여 탈락여부를 결정한다.

3) 설계도면 및 설명서(15부)

① 지    질 : 표지는 백색아트지, 내용지는 백상지로 한다.

② 규   격 : A3(420mm×297mm) 크기로 장변이 수평이 되도록 횡으로 작성하며, 무선 무철로 접착제 제본(좌편철)하여 제출한다.

③ 매   수 : 12페이지 이내 1부

(표지 및 목차는 쪽수산정에서 제외, 양면인쇄 금지, 간지 사용 불가)

④ 표   지 : [서식 10]

⑤ 표지를 제외한 내용물의 글자크기(숫자포함)는 제목 및 내용의 위계에 따라 식별 가능한 범위에서 크기 조정이 가능하며 글씨체는 신명조체를 사용한다.

⑥ 15부 중 보관용 1부는 표지에만 대표 건축사사무소명 및 대표자 성명을 기재 날인하고, 심사용 14부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

⑦ 설계도면 및 설계설명서에 포함되어야 할 기본구성은 아래와 같으며, 작성내용은 설계자 의도에 따라 증감이 가능하다.

㉠ 표    지

㉡ 목    차

㉢ 조감도 및 투시도 (2페이지 이내)(컷수 제한 없음)

㉣ 대지현황 분석

㉤ 설계개요 (건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등 과 작품의 핵심개념 표기)

㉥ 평 면 도

㉦ 건축계획

- 배치도

- 입면도(2면 이상), 단면도(2면 이상)

- 층별 평면도

- 통풍 측, 조망, 도로, 주차장, 인근 건축물과의 거리 분석 등

㉧ 외부 공간계획, 주요경관 및 색채계획

※ 위 작성내용과 순서를 준수하되 설계자가 항목 추가 가능.

4) 설계도서 USB (1매)

① 수록목록 : 조감도(스케치업 파일), 설계도면 및 설계설명서 (PDF File)

② 각 도면, 사진에는 제출회사명, 설계자 등을 표기한 타이틀 또는 참조박스 등 어떠한 표시를 하지 말아야 한다.

③ 파일명, 폴더이름 등에 암호, 제출회사명 등을 기입하거나 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 표시를 하지 말아야 하며, 기입 또는 표시한 작품은 감점기준에 따라 감점 처리된다.

④ 제출목록이 누락된 경우 감점기준에 따라 감점 처리된다.

Ⅳ.	작품심사 및 당선작 선정

1. 작품심사

가. 일시 및 장소

1) 일    시 : 2025. 6. 9.(월) (예정)

2) 장    소 : 청주시청 제2임시청사 5층 소회의실

※ 일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우에는 별도통보

나. 심사위원

심사위원(5)	최승희(교수)
	양현모(건축사)
	김진아(건축사)
	박인희(건축사)
	손종태(건축사)
예비 심사위원(2)	정운근(건축사)
	곽희산(건축사)

1) 위원장은 회의를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

2) 임의로 심사번호를 부여하여 공정하고 합리적으로 심사한다.

3) 심사위원회의 결정사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 민ㆍ형사상 쟁송의 대상이 될 수 없다.

4) 심사위원회는 응모작품의 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 때 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

5) 본 심사는 심사 과정이 녹화 및 녹음되어 심사가 끝난 후 청주시 홈페이지에 공개된다.

6) 예비 심사위원도 심사에 참여하여 토론하여야 하며, 다만, 의결에 참여할 수 없다.

2. 입상작 선정

가. 심사절차

1) 발주처 심사(예비심사)

① 평가 및 실격처리 대상 선정 후 본 심사에 상정(감점기준 등)

2) 위원회 심사(본 심사)

① 심사위원의 심사결과에 따라 심사위원회에서 선정한다.

② 응모작품수가 10개 이상일 경우 심사위원의 심사결과에 따라 2차 심사대상으로 5개 작품을 선정한다.

③ 심사위원회는 2차 심사로 선정된 5개 작품의 발표 심사 여부를 결정한다.

④ 2차 심사를 발표 심사로 진행할 경우 2차 심사의 일정은 1차 심사일로부터 1주 이내 진행되며 심사위원의 일정을 고려하여 다시 공지한다.

⑤ 발표 심사가 진행될 경우 건축사[Ⅰ, 2, 4) 규정에 의한 응모자]가 참석하여 10분 이내로 발표하여야 하며, 불참할 경우 선정에서 제외된다.

나. 심사는 「국토교통부 고시 제2023-180호(건축설계공모 운영지침)」등을 고려하여 심사위원회에서 정한 방법으로 심사하나, 채점제 또는 투표제 중 어떤 심사 방식이든 충분한 토론 후 심사하여, 투표제로 심사할 경우 심사위원들의 토론을 거쳐 최다 득표작을 당선작으로 선정하고, 채점제로 심사할 경우 아래의 배점 및 기준에 따른다.

1) 채점제로 심사할 경우 위원별 심사점수 합계를 100점 만점으로 환산한 심사위원 평점에 지역업체 기여도 점수 및 내부평가의 감점점수를 반영한 점수로 다음과 같이 산정한다.

① 소수점 이하 숫자가 있는 경우 셋째자리에서 반올림함

※ 종합평점 =	(	위원별점수합계	)	- 감점점수 + 지역업체 기여도
		참석위원수

2) 지역업체 기여도는 아래와 같이 산정한다.

평가항목	평 가 요 소	배 점
지역업체 기여도	※ 충북도 내 ┌ 지역업체 단독응모 시 <3점> └ 지역업체 간 공동응모 시 <3점>	3점

3) 종합평점 산정 결과 동점일 경우에는 창의성, 배치 및 공간계획, 평면계획, 경관 및 주변과의 조화 등의 순서로 높은 점수를 얻은 공모 안을 당선작으로 선정한다.

- 동점자 처리에도 당선자가 판정되지 않을 경우 심사위원 과반의 찬성을 얻은 작품을 당해 작품으로 선정한다.

※ 심사위원회에서 정한 방법(세부기준)에 따라 위 심사기준은 변경될 수 있음

3. 분야별 설계 평가기준 (배점기준 100점)

평가항목	세 부 평 가 사 항	배점	비고
창의성	￭ 계획안의 창의성	10
	￭ 기존 사례와의 차별성	10
	￭ 디자인의 우수성	10
배치 및 공간계획	￭ 배치 및 토지 이용의 합리성	7
	￭ 동선(보행자,차량,자전거)계획 및 옥외공간계획	7
	￭ 보행자 및 차량 접근 계획의 적절성	6
평면계획	￭ 내ㆍ외부 평면계획의 적절성	8
	￭ 공간 이용의 효율성	6
	￭ 동선 및 기능배분의 타당성	6
경관 및 주변과의 조화	￭ 주변 공간 및 환경과 연계 및 조화	8
	￭ 입면 디자인 계획의 합리성	6
	￭ 색상 및 재료 계획의 적절성	6
경제성 (기술계획)	￭ 환경친화적 설계기법의 적절성	4
	￭ 비용 절감 등 경제성	3
	￭ 건물 구조 및 공법 등의 합리성	3
감점사항	감점 및 실격기준 참고	△10

4. 상대평가 시 등급

가. 상대평가시 등급은 수,우,미,양으로 하고 점수는 수(100%), 우(90%), 미(80%), 양(70%)로 하며, 채점대상 작품 수에 따른 등급배분은 다음과 같이 한다.

업 체 수	등 급
	수	우	미	양
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	2	2	1
7	1	2	2	2

※ 7개 업체 이상일 경우 1개 업체 증가 시 마다 수, 미, 우, 양 순으로 등급수 증가시킨다.

5. 심사 시 불이익 처분기준

가. 불이익 처분기준 적용방법

1) 발주처는 제출된 작품에 대하여 심사 전에 실격사유에 해당하는 대상작품을 검토하여 실격여부를 상정하여, 심사위원회의 심의 및 결정을 통해 실격 판정한다. 실격으로 판정된 작품은 평가대상에서 제외한다.

2) 발주처는 사전검토를 통해 감점기준에 의한 검토 결과를 심사위원회에 상정하여 심사위원회에서 의결하여 감점 처리한다.

3) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유를 들어 심사위원회의 결정으로 조정할 수 있으며, 아래 기준에 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분기준은 심사위원회에서 의결하여 조정 적용한다.

나. 실격기준

1) 참가자격 없는 자나 참가서류를 허위로 작성하여 제출한 경우

2) 건축대지의 형태, 범위, 지적을 임의 조작 설계하여 시공이 불가능한 경우

3) 건폐율·용적률 등의 기준을 위반하거나 관련 법규에 저촉되어 전체적인 계획에 영향을 주는 경우

4) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

※ 실격처리는 심사위원회 구성 후 작품 심사 전에 발주기관에서 실격 사유와 대상 작품을 심사위원회에 상정, 실격여부를 심의 결정 하고 실격 판정 시 평가대상에서 제외한다.

※ 발주처 사전검토한 사항을 심사위원회에 상정하여 판단 결정

다. 감점기준(최대 10점 이내)

구 분	분 야	감점기준(-)	감점 한도	누계 한도
소요사업비	- 예산범위 초과(1%초과 1점, 3%초과 2점, 5%초과 3점)		3.0점	10점
연면적 위반	- 연면적 미달 및 초과(±3 %초과 2점)		2.0점
도서작성 기준위반	- 설계도서의 규격ㆍ재질 위반	0.5점/도서종류별	2.0점
	- 제출도서 부족	0.2점/부당
	- 설계도서 기준매수(쪽수) 초과	0.1점/쪽당
	- 제본방법 미준수	0.2점/도서종류별
도 서	- 설계지침사항 미준수	0.5점/건당	3.0점
지침위반

1) 감점기준 이외에 심사위원회에서 별도의 감점을 적용할 수 있음

2) 감점 기준에 대하여 심사위원회에서 중대한 사항 위반이라고 판단 시 실격여부를 결정할 수 있음

6. 입상작 발표

가. 일시 및 장소

1) 일    시 : 2025. 6. 10.(화)

2) 장    소 : 청주시 홈페이지 게시(공지사항)

나. 심사의 결과(심사위원별 평가점수, 입상작 등)를 서면이나 홈페이지 등을 통해 심사위원과 설계공모 응모자의 실명과 함께 공개

다. 당선작, 우수작 및 가작은 청주시에서 정하는 장소에 일정기간 작품을 전시·공개할 수 있다.

7. 입상작 및 시상

가. 입상의 종류 및 상금은 다음과 같다.

1) 당선작 1점 : 설계(기본 및 실시)용역 수의계약권 부여

2) 보상비 예산 : 31,800 천원

3) 기타 입상작 보상금

구 분		보상금액	비고
응모작품수 (실격제외)	보상대상수
2개	1개	10,400천원
3개	2개	12,700천원 9,600천원
4개	3개	12,700천원 9,600천원 6,300천원
5개 이상	4개	12,700천원 9,600천원 6,300천원 3,200천원

※ 입상작으로 선정된 자가 15일 이내에 보상금 지급을 신청하지 않을 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

※ 제세금 포함 금액이며, 상금에는 사용권료 포함임

나. 입상자는 당해 심사위원회가 정하며 최대4인 이내로 한다.

다. 응모자는 심사결과에 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 설계공모 공고내용에 규정된 시상내용 이외의 보상을 요구할 수 없다.

Ⅴ.	당선 이후

1. 당선 이후 조건

가. 계약

1) 당선작에 대한 설계용역계약은 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 의한 법률”과 청주시의 계약기준에 따른다.

2) 당선자는 건축, 구조, 설비분야(전기,기계,통신,소방 등)에 대한 자격요건이 있는 관계법령에 의한 적법 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도급(분담이행)한다.

3) 본 설계공모와 관련하여 당선자가 제출한 서류 및 작품의 건물면적 등에 허위사실이 발견되거나 건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 청주시가 갖는다.

4) 당선자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 청주시와 설계계약에 관해 협의하여야 하며, 특별한 사유 없이 7일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다. 다만 청주시의 사정, 사업 추진여건에 따라 당선자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

5) 당선자가 설계를 진행할 수 없다고 판단되거나 당선자의 사정으로 설계가 수행되지 못할 경우 2등(우수작) 및 3등(가작)에게 순차적으로 설계의 권한을 부여할 수 있다. 이 경우 이미 상금을 지급한 경우에는 상금 금액만큼 공제한 금액을 설계비로 지급한다.

6) 당선자로 결정된 후 계획변경 등 청주시의 사정에 의하여 용역이 중단될 경우 이의를 제기할 수 없으며, 용역 공정률의 정도에 따라 용역비를 정산하여 지급한다.

7) 당선자가 설계를 시행함에 있어 과다설계가 되지 않도록 예정공사비 이내로 하여야 한다.

8) 당선작이 이미 발표된 다른 작품의 전체 혹은 많은 부분을 모방한 작품으로 판명된 경우에는 당선이 취소될 수 있다.

9) 본 설계 계약과 관련하여 수반되는 모든 법적 관리, 책임 및 의무사항은 당선자 또는 공동 설계팀의 경우에는 대표 설계자에게 있으며, 이를 공동설계자에게 승계할 수 없다.

나. 설계 진행

1) 설계공모는 설계의 작업을 위한 것으로 당선자는 진행 과정별로 청주시와 협의하여 설계하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 보완, 수정한다.

3) 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 청주시의 기본 방침 또는 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 변경 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

5) 실시설계 과업기간 중에 구조심의 등 심의를 이행하여야 할 경우 감독원이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며 기타, 각종 보고회 개최 등 과업으로 지시하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 한다.

2. 제출 작품

가. 입상작은 반환하지 않고 청주시가 보관한다.

나. 입상작의 저작권은 원칙적으로 설계자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

다. 발주처는 심사결과를 발표한 후 공고한 대로 일정 기간 입상작 등 공모안을 전시할 수 있다.

라. 입상작 이외 응모작은 당선작 발표 후 7일 내 응모자가 직접 반출하여야 하며, 기간 내에 반출하지 않은 작품은 청주시가 임의로 처분할 수 있으며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

3. 기타, 설계공모 관련 지침

가. 설계공모는 2개 업체 이상 응모하여야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고할 수 있으며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 청주시의 결정에 따라 진행한다.

나. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

다. 본 지침서의 문구 해석상 발주처와 응모자간에 차이가 있을 경우는 발주처의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 청주시가 정하는 바에 따라야 한다.

Ⅵ.	설계지침

1. 설계의 기본방향

가. 일반사항

1) 지역주민 및 청소년들이 이용하는 시설이므로 권위적이고 획일적인 디자인은 지양하고, 편안하고 친근한 이미지의 상당청소년문화의 집이 되도록 한다.

2) 호미골 체육공원-상당청소년문화의집-금빛도서관까지의 동선의 흐름이 자연스럽게 연계되도록 고려하며, 주변 자연환경과 어우러지는 외부 공공 공간 및 색채와 재료를 사용하여 조화를 추구한다.

3) 청소년들이 주체가 되어 각자가 머물 곳을 자유롭게 찾아가며 참여할 수 있는 문화의 집이 되도록 한다.

4) 청소년문화의집 운영인력을 위한 관리실 및 방과후 아카데미를 지도하는 지도자실을 각 프로그램을 효율적으로 관리할 수 있도록 배치한다.

5) 청소년들이 자유롭게 프로그램에 참여할 수 있도록 공용공간과   연계되도록 구성한다.

6) BF인증 기준에 맞는 설계를 계획한다.

7) 외부공간의 바닥 패턴과 색채는 인접보도나 도로의 포장형식 (재료, 색채, 패턴)과 연속성을 갖도록 한다.

8) 보행동선 차량동선의 간섭이 최소화되어 안전한 보행환경(특히, 장애인과 노약자 등)이 되도록 계획한다

9) 주요 접근로는 인접보도와 연계하고, 단차를 없애 보행자의 접근성을 증대한다.

10) 자전거이용자를 위한 자전거 거치대 공간을 확보한다.

11) 출입구 전면 및 진입로에 여유 공간을 확보하여 이용자의 진출입시 도움이 되도록 한다.

12) 주변의 주거지 및 자연경관과 어울리는 재료로 선정한다.

13) 주민들과 청소년들이 일상 속에서 편하게 찾을 수 있는 밝고   활동적인 환경을 조성할 수 있는 재료로 선정한다.

14) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

15) 장래의 시설확장 및 기능변화에 대응할 수 있는 가변성 있는 내부칸막이 및 건물배치를 하며, 공간구성은 개방성 있게 하고, 조경, 주차시설을 합리적으로 계획한다.

16) PD, AD, EPS, TPS, 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

17) 기타 세부계획 및 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주자의 해석에 따라 실시설계를 수행한다.

2. 계획 세부지침

가. 배치 계획

1) 대지의 주변현황과 법규 및 지구단위계획 지침을 고려하여 가장 효율적인 배치계획 수립을 한다.

2) 서측 호미로와 호미골 체육공원내 산책로를 고려하여 주출입구를 계획한다.

3) 이용자의 효율적 동선 유도를 고려하여 주차장에 부출입구를 인접 배치한다.

4) 주변 교통에 영향을 최소화 할 수 있도록 진출입을 계획하며, 인접대지의 북측 주차장을 통합적으로 활용하도록 한다.

5) 주차장의 면적은 최소 150㎡ 이상으로 계획하며, 장애인을 고려한 계획 및 환경친화적 전용주차구역도 고려한다.

6) 공원과 인접하여 채광에 유리한 남측에 이용공간을 배치하고 북측에 주차장과 코어 배치하여 효율적이고 쾌적한 공간 형성한다.

7) 자전거 이용자들을 위한 자전거거치대를 보행로와 인접 배치한다.

8) 남측 체육공원을 조망하고 녹지축을 연장하는 외부마당 형성한다.

9) 보행자와 차량동선은 보차분리를 원칙으로 하며, 보행자 동선에 혼선이 야기되지 않도록 명쾌한 동선체계를 반영하여야 한다.

10) 비상차로를 건물에 4면이 모두 면하게 계획하여 비상시에 활용

11) 다양한 문화프로그램을 진행할 수 있도록 서비스 차량(하역공간)을 계획한다. (부출입구를 통한 기구 및 장비를 하역할 수 있도록 주출입 동선과 분리)

12) 공원내 테니스장과 연계하여 사용할 수 있는 내ㆍ외부공간을 계획

13) 다양한 옥외 휴게공간을 계획하여 청소년들의 다양한 활동이 이루어질 수 있도록 제안

나. 평면계획

1) 현대적인 시설과 공법을 도입하고 최소의 인원으로 효율적인 관리가 되도록 한다.

2) “시설계획(안) 및 시설별 활용계획(안)”을 참고하여 설계하여야 한다

3) 각 실의 기능에 따라 접근성, 독립성, 연계성 등을 고려한 합리적인 설계가 되도록 한다.

4) 출입구, 복도, 문, 화장실, 엘리베이터 등은 휠체어 등의 사용에 장애가 없도록 설계하고, 접근로 계획시에는 단차이가 있을 경우 장애인과 노약자를 위한 경사로(1/18이하)를 설치하여야 한다.

5) 휴식과 만남을 위한 장소, 주변경관을 즐길 수 있는 공간을 계획한다.

6) 각종 기계장치 및 설비장비 등의 기계실은 필요 면적을 감안하여 계획한다.

7) 비상시 대피가 원활히 이루어질 수 있도록 비상재해 대피시설 기준을 준수하여 설계하다.

8) 북카페, 가사, 요리실습실과 연계되는 외부공간을 배치하여 내외부로 공간을 확장하여 다양한 프로그램 활용 유도한다.

9) 1층에 운영인력을 위한 관리실, 양호실, 회의실, 문서고/물품보관실을 배치하여 관리의 효율성을 높인다.

10) 자치 활동실은 이용자의 수에 따라 가변적으로 확장하여 사용할 수 있도록 가벽을 활용하여 공간의 활용성을 높인다.

11) 복도, 로비 등 공용공간은 다목적으로 활용할 수 있도록 하여 청소년들의 자연스러운 참여와 체험을 유도한다

12) 방과후 아카데미 전용교실과 강의실은 이용자의 수에 따라 가변적으로 확장하여 사용할 수 있도록 가벽을 활용하여 공간의 활용성을 높인다.

13) 물품 수납을 위한 공간을 실 내부에 계획하여 편의성 확보한다.

14) 소음과 진동이 큰 프로그램 (다목적 강당, 각종 연습실 등)은 타 프로그램의 운영에 영향이 없도록 조닝 및 방음을 계획한다.

15) 세부 계획은 예시를 참고하여 설계자가 자유롭게 제안한다.

다. 외부공간 계획

1) 외부공간 계획시 사회적 약자를 위한 무장애(Barrier free) 및 유니버셜 디자인(Universal Design)을 실현한다.

2) 노약자 등의 신체 특성상 경사로는 최소 1:18 비율로 계획한다.

3) 미끄러짐을 방지할 수 있는 마감 재료를 선정한다.

4) 유아ㆍ임산부ㆍ장애인의 편의를 위하여 경사로나 계단에는 핸드레일을 설치한다.

5) 자연적인 재료를 사용한 벤치나 외부 휴게공간을 제공하여 심리적으로 안정감을 줄 수 있는 자연친화적인 외부공간을 계획한다.

6) 외부공간 활용도를 높이기 위해 기후영향을 최소화 하는 계획 권장한다. (막구조물, 파고라설치, 그늘 식재 등 제안)

7) 지역주민 및 공원 이용객이 이용 가능한 옥회 휴게ㆍ편의시설을 설치

라. 입면계획

1) 본 계획은 청소년들이 주로 이용하는 공간임을 감안하여 위압적이거나, 권위적이기 보다는 밝고 친근하며, 주위 환경과 어울리는 청소년문화의 집 정체성을 보여줄 수 있는 미래지향적 건축물이 되도록 계획한다.

2) 건축물의 형태, 재료, 색채 등 디자인 요소들이 통일성 있고 조화 되도록 계획한다.

3) 외부 마감재는 에너지효율 및 운영관리 비용절감을 위해 유지 관리가 용이한 재료를 사용하여 외관 디자인을 계획

4) 북카페 및 휴게공간에서 주변 공원을 조망할 수 있도록 적절한 크기의 창호를 설계한다.

5) 창호설계는 냉난방 미가동시 자연환기를 최대한 이용할 수 있는 구조와 크기 등을 고려하여 계획한다.

6) 자연채광 및 환기 등을 고려하며, 에너지 효율 및 안전의 효과도 극대화 되도록 계획한다.

7) 내구성과 경제성을 갖춘 자연재료를 사용을 권장한다.

마. 단면계획

1) 건축부지의 단차를 고려한 합리적인 설계방안을 계획하여야 한다.

2) 실의 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간계획이 되도록 계획한다. (예: 북카페 및 다목적강당은 높은 층고로 계획하여 채광 및 조망 확보)

3) 너무 정형화된 공간에서 벗어나 공간의 다채로움을 추구한다.

4) 가급적 건물 내부에 단차가 생기지 않도록 계획하여 계단 등 단차 해결을 위한 구조물로 인한 동선 이동의 불편함이 없도록 한다

5) 냉난방배관, 공기순환기배관, 급배수관, 전선트레이, 소방시설, 통신선 등의 원활한 설치를 위한 천정 공간확보가 가능하도록 층고 및 천정마감선이 고려되어야 한다.

바. 구조계획

1) 건물의 골조는 건물의 기능, 규모, 경제성, 안전성, 시공성 등을 검토하여 계획한다.

2) 구조의 설계는 경제적이며 합리적인 구조계획과 정밀한 구조 계산에  의하여 어떠한 경우에도 구조물의 안전이 우선되어야 하며, 관련법규의 적정치 이상으로 처짐, 진동현상 등이 발생하여서는 안된다.

3) 진동 및 소음에 대한 안정성을 확보하여야 한다.

4) 지하층 바닥 골조 및 벽체 등은 우수의 유입, 결로 및 지하수에 대해 안전하도록 설계하고, 지하외벽은 토압과 수압을 견딜 수 있도록 설계한다.

5) 지하수위로 인한 건물의 부력에 대한 안전성을 고려하여야 한다.

6) 지진에 대비한 내진설계를 하여야 하며, 법에서 정한 규정을 반드시 지켜야 한다(설계기준강도 표현)

7) 각실의 기능을 고려하여 충분한 하중을 견딜 수 있는 구조로 계획한다.

8) 각 층고는 내부 실의 개방감 및 환기량, 냉ㆍ난방방식, 각종 설비재의 배관 등을 고려하여 계획한다.

9) 토질 조사는 기존 지반조사 자료를 활용하며 필요시 후 추가 조사를 통해 지반의 상태에 따라 기초양식을 결정한다.

바. 조경 및 주차 계획

1) 건축법 및 국토교통부 조경기준, 청주시 건축조례 등에서 정한 조경의무 면적, 식재수량 등 관련규정을 준수한다.

2) 식재수종은 기능에 따라 선정하고, 보존가치가 있는 식물은 이식 될 수 있도록 설계에 미리 반영한다.

3) 조경대상지는 주변의 생태환경을 고려하고, 기존 조경은 훼손을 최소화 하며, 환경 친화적인 방법으로 복구방안을 수립한다.

4) 휴게공간의 시설물은 현대적 감각에 의한 시각적 안정 및 주변 환경과 어울리는 환경 친화적인 재료를 선정한다.

5) 주차는 경제적이고 기존 기능과도 조화를 이룰 수 있으며 합리적인 설계로 원활한 교통체계를 유지 할 수 있도록 계획한다.

6) 자전거 이용 활성화를 위해 자전거 보관(거치) 장소를 고려하여야 한다.

7) 북측 인접대지의 금빛 도서관 주차장을 활용하여 주차장을 통합적으로 사용할 수 있도록 계획한다.

8) 주차장 및 부출입구와 인접하여 하역동선을 계획한다.

9) 화재 및 비상시를 대비하여 별도의 비상차로를 확보한다.

10) 주차장은 옥외주차장 기준 차량 1대 당 30~35㎡의 면적을 확보하도록 계획한다.

사. 친환경, 녹색건축물, 에너지절약 계획

1) 관련법에 따라 에너지효율등급 등 각 등급에 맞게 설계하여야 한다.

2) “장애물 없는 생활환경 인증(B.F.인증)을 참조하여 노약자/장애인/임산부의 편의를 고려하여 계획하여야 한다.

3) 건축물 에너지 효율등급, 제로에너지 건축물(5등급) 획득

4) 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 유지관리비 과부담 등의 이유로 시설물이 유휴화 되는 일이 없도록 설계하여, 지속가능한 친환경 녹색건축물을 구현한다.

5) 신재생 에너지 의무 공급량 충족해야한다.

6) 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고, 공용공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산, 실내 채광을 위한 채광창 확보에 유의할되지 않도록 고려하여야 한다.

7) “실내공기질 관리법”에 따른 다중이용시설의 실내 공기질 기준을 충분히 고려하여 계획해야 한다. (실내공기질 관리법 시행규칙 [별표2, 3]의 다중이용시설 참고)

아. 의장 계획

1) 청주시 경관계획에 적합하도록 외부색채, 실내ㆍ외의 마감재 및 각종 시설물의 색상계획 등 시각 이미지 통합계획을 반영한다.

2) 부위별 마감재료 및 색상선정 : 내ㆍ외부 안내판 계획을 고려한다.

3) 사인시스템 계획을 고려한다

자. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주처와 협의하여 선정한다.

3) 부득이 수입자재 등을 사용시에는 사전에 발주처와 협의하여 결정한다.

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산공급처를 확인 후 설계한다

카. 시설(공간)계획

1)「청소년활동 진흥법 시행규칙」제8조 관련 [별표3] 수련시설의 시설기준 등 청소년수련시설의 규정에 적합한 내‧외부 공간을 계획한다.

【청소년문화의집 시설기준】

구 분	기 준
1) 활동시설 2) 휴게시설 3) 위생시설 4) 기타시설 5) 수용정원	1. 공통기준 나목의 1) 및 5)부터 7)까지에 해당하는 시설 중 두 종류 이상을 갖추어야 한다. 휴게실을 별도로 설치하거나 실내공간 또는 마당을 청소년의 휴식 및 대화장소로 제공할 수 있는 구조로 배치하여야 한다. 수용정원에 적합한 화장실ㆍ세면장 등을 설치하여야 한다. 물품보관시설을 갖추어야 한다. 1)에 해당하는 시설(실내시설에 한정한다)을 일시에 사용할 수 있는 적정인원을 말한다.
※ 참고자료	1. 공통기준 나목의 1) 실내집회장(150㎡ 이상) 나목의 5) 특성화수련활동장 나목의 6) 자치활동실 나목의 7) 강의실(1실당 50㎡ 이상)

2) 청소년의 주도적, 능동적 역할을 강조하는 청소년 정책의 패러다임 변화에 발맞춰 아래의 기능이 기본적으로 반영될 수 있도록 공간을 설계한다.

<청소년문화의집 주요 기능>

청소년

문화의 집

놀이와 게임의 공간

스트레스 해소에 도움이 되는 다양한 여가활동

미디어 제작·활용 공간

음악, 영상 등 미디어 컨텐츠 제작 및 활용 공간

모임과 소통의 공간

청소년 자치기구, 동아리 활동, 토의·토론을 위한 공간

휴식의 공간

편안하고 안전한 북카페 등 휴게공간 제공

교육·학습의 공간

강의, 조별과제 등에 필요한 지원 제공

체험의 공간

요리, 과학실습, 어학실습 등 진로 및 직업체험 기회 제공

3) 공간 구성은 청소년활동 진흥법 시행규칙상 시설기준, 여성가족부 정책방향(지침) 및 아래 시설기준(안) 조건을 참고하여 공간별 기능 및 특성을 종합적으로 고려하여 설계자가 창의적으로 자유롭게 합리적인 최적안을 제안한다.

■ 북카페

- 북카페는 북측 금빛도서관과 연계하여 활용할 수 있는 방안을 고려하여 제안

- 주 이용자는 청소년이지만, 학부모 대기가 이루어질 수 있도록 홀과 인접하여 배치하되 청소년 공간과는 이격하여 배치

- 2개층 이상의 층고로 계획하여 충분한 채광 확보

- 인접한 공원을 조망할 수 있도록 계획하되 테니스 장에서 발생하는 소음을 고려하여 계획

- 단순히 정숙한 독서공간으로 계획이 아닌 다목적 이벤트 공간으로 활용이 가능할 수 있도록 계획

- 북콘서트, 작가 사인회, 낭독회 등의 장소로 활용하며 1,2층을 물리적으로 연결하는 특별 공간으로 계획

- 북카페와 인접하여 로비 및 홀을 계획하여 각 실공간으로 진입하기 위한 전이공간으로 충분히 활용 될 수 있도록 계획

그림. 북카페 참고이미지

■ 다목적강당

- 다목적강당은 수련시설의 시설기준에 적합하도록 150.00㎡이상으로 계획(수용인원은 150명 이하)

- 다양한 체육활동이 이루어질 수 있도록 무대가 없는 형태로 계획하여 활동공간을 최대로 계획

- 배드민턴, 탁구, 미니 농구, 체조, 클라이밍 등의 다양한 체육교육이 가능하도록 계획

- 주 이용자는 청소년이지만 주민들을 위한 개방이 가능할 수 있도록 청소년 시설과는 별도로 활용할 수 있도록 계획

- 2개층 이상을 오픈하여 체육활동에 충분한 층고를 확보하며, 최소 6m 이상의 층고로 계획

- 자연채광 및 에너지부하를 고려하여 창을 계획하되 청소년 안전을 고려하여 높이를 계획

그림. 다목적강당 참고 이미지

■ 그룹동아리실(자치활동실) 및 특성화수련활동장

- 청소년을 위한 공간으로 실별 활동에 부합하도록 계획하며 가변적으로 활용될 수 있도록 함

- 외부인의 방문이 이루어지는 시설과는 이격하여 청소년들이 안전하게 이용하도록 계획

- 댄스실, 음악실, 노래연습실, 스튜디오실 등 방음이 필요하다고 판단되는 실은 방음재를 적용하요 실 계획을 하여 실별 프로그램 진행에 어려움이 없도록 함

- 각 실의 냉난방을 개별로 제어할 수 있도록 중앙식 GHP 시스템을 적용하여 계획

- 소음과 실별 이용을 고려하여 층별 조닝을 계획

그림. 자치활동실 및 스튜디오실 참고 이미지

■ 방과후 아카데미 교실

- 층별 또는 구역별 조닝을 통해 방과후 아카데미 교실이 인접한 시설과 연계되는 동선과 기능을 최적화하며, 외부 방문객과의 동선을 분리.

- 방과후 사무실 및 상담실과 인접배치하여 방과후 사무실-교실-상담실을 하나의 조닝으로 계획

- 쾌적한 환경에서 학습과 활동을 병행할 수 있도록 계획하며, 중앙식 GHP 시스템을 적용하여 개별적으로 제어할 수 있도록 설계

- 자연채광을 확보하되 학습에 방해가 되지 않도록 블라인드나 차양시설을 계획하여 유입양을 조절할 수 있도록 함

- 활동 유형에 따라 유연하게 활용 가능한 공간으로 설계하며, 필요시 공간 분할 및 통합이 가능하도록 가변형 칸막이나 이동식 가구를 도입

그림. 방과후 아카데미 교실 참고 이미지

【실별 시설기준(안)】

수련시설의 개별기준인 1)활동시설 중 선택해야하는 두 종류 이상의 시설은 설계자의 의도에 따라 제안가능, 실내공간은 법적 의무공간 외 유동적인 공간구성으로 변화하는 청소년 수요에 즉각적으로 대응 가능하도록 계획

▣ 이용공간

구분	실 명	규모	산출근거
이용공간	북카페 및 휴게실		※방과후아카데미 시설기준 (권장모형)	북카페 및 휴게시설 참여 청소년들이 도서와 정보를 쉽게 접할 수 있는 공간으로 구성 (단, 지역사회 내 도서관 등 시설 활용 가능) 북카페 : 도서 구비공간 필요, 독서와 휴식이 가능한 공간 계획, 공간이 좁은 경우 로비 활용 휴게실 : 이용자의 휴식 및 대화장소 제공
	다목적강당	1실	※수련시설의 시설기준 (개별기준 중 선택) (단위시설·설비기준)	개별기준1)활동시설 중 실내집회장 가) 강당·회의실 등으로서 개별기준에서 정한 집회장 수용인원이 150명 이하인 경우에는 150㎡, 150명을 초과하는 경우에는 초과하는 1명마다 0.8제곱미터를 더한 면적 이상의 면적이어야 하며, 그 면적의 합계가 800㎡를 초과하는 경우에는 800㎡로 할 수 있다. 실내체육활동 공간과 병행하여 사용가능하도록 계획 대기실, 탈의실 등 다목적 공간 필요
	그룹동아리실 (자치활동실)	1실	※수련시설의 시설기준 (개별기준 중 선택) (단위시설·설비기준)	개별기준1)활동시설 중 6)자치활동실 동아리활동·분임토의 등에 이용되는 시설로서 의자·탁자 등을 갖추어야 한다. 실별 수용인원 20명 정도 수용할 수 있는 공간으로 계획 사용목적에 따라 유연한 가변형 공간으로 계획
	특성화수련활동장-1 (댄스연습실)	1실
	특성화수련활동장-2 (가사,요리실습실)	1실
				개별기준1)활동시설 중 5)특성화수련활동장 나) 과학 및 정보화능력 함양활동장 미디어실 : 다양한 콘텐츠 제작이 가능한 크리에이티브 공간 마련, 방음시설 구비 요리연습실 : 개인별 요리시설로 환풍, 급배수 시설, 싱크대, 수도 등 주방시설 구비 공간 계획
	특성화수련활동장-3 (음악실)	1실
	특성화수련활동장-4 (노래연습실)	1실
	특성화수련활동장-5 (네일아트 창작실)	1실
				개별기준1)활동시설 중 5)특성화수련활동장 가) 문화적 감성 함양 활동장 댄스연습실 : 나무바닥, 거울(2면) 설치, 1회 20명가량 활동 가능 구조, 소규모 인원연습시 가벽(무빙월) 설치, 흡음 및 방음시설 필요 밴드연습실, 음악연습실 : 흡음 및 방음 등 밴드 및 음악 연습에 적합한 구조, 수용인원 10명 정도 공간계획
	특성화수련활동장-6 (게임실)	1실
	특성화수련활동장-7 (스튜디오실)	1실
	강의실	2실	※수련시설의 시설기준 (개별기준 중 선택) (단위시설·설비기준)	개별기준1)활동시설 중 7)강의실 가) 1실당 면적 : 50㎡ 이상 나) 칠판·교탁·책상·걸상 등과 그 밖에 필요한 기구·설비를 갖추어야 한다. 다) 책상면과 흑판면의 조도가 150럭스(lux) 이상 실별 수용인원 20명 정도 수용할 수 있는 공간으로 계획 사용목적에 따라 유연한 가변형 공간으로 계획
	놀이공간			포켓볼, 보드게임방, 노래방 부스, 컴퓨터 정보검색 공간 등 설치
	방과후아카데미 전용교실-1	1실	※방과후아카데미 시설기준 (권장모형)	전용공간(교실) 40명반 : 20명 기준 2개 교실 지하층 배제, 환기 원활
	방과후아카데미 전용교실-2	1실

- 산출근거 : 청소년활동 진흥법 시행규칙 [별표3] 수련시설의 시설기준 및 여성가족부 방과후아카데미 시설기준 참고

▣ 관리공간

구분	실 명	규모	산출근거
관리공간	방과후아카데미 지도자실	1실	※방과 후 아카데미 시설기준	지도자의 사무 및 연구, 회의 및 상담, 기자재 보관 공간 등으로 구성, 방과후아카데미 전용교실과 동일 층 배치 권장 수용인원 5여 명 가능한 공간
	관리실&양호실	1실	※수련시설의 시설기준 (일반기준)	관리실·사무실·안내시설 등 시설물의 관리·운영에 필요에 필요한 시설·설비를 수련시설의 종류에 따라 설치하여야 한다. 청소년문화의집 운영을 위한 종사자 사무실로 방송실, 탕비실, 양호실 등 구성 근무인원 10여 명
	상담실	1실	※수련시설의 시설기준 (단위시설·설비기준)	다수의 상담이 동시에 가능하도록 설치하는 경우에 있어서는 칸막이 등을 설치하여야 한다. 개인상담실, 집단상담실 구분 방음, 내부가 보이지 않는 형태
	회의실	1실		수용인원 10여 명 가능한 공간

- 산출근거 : 청소년활동 진흥법 시행규칙 [별표3] 수련시설의 시설기준 및 여성가족부 방과후아카데미 시설기준 참고

▣ 부속공간

구분	실 명	산출근거
부속공간	장애인용 EV	-	-
	장애인화장실(남)	※수련시설의 시설기준 (개별기준)	위생시설 수용정원에 적합한 화장실 및 세면장 등을 설치
	장애인화장실(여)
	화장실(남)
	화장실(여)
	물품보관실	※수련시설의 시설기준 (개별기준)	기타시설 물품보관시설을 갖추어야 한다.

- 산출근거 : 청소년활동 진흥법 시행규칙 [별표3] 수련시설의 시설기준 참고

▣ 설비공간, 공용공간

- 설비공간 : 기계실, 전기실

- 공용공간 : 홀 및 복도, 방풍실-1, 방풍실-2, 직통계단

※ 설계안에 따라 설비공간 면적 조정가능

▣ 수용정원 산정방법

※ 아래 관련법을 참고하여 법정 수용 인원과 비상시 피난계획에 영향이 없는 적정인원수를 산정하여 실규모를 계획함

	《 수용인원 산정방법 》
▶ “화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령”제15조 [별표 4] 단, 실내집회장(강당)은 청소년활동진흥법 시행규칙 제8조 [별표3] 기준 ☞ 강의실, 상담실, 실습실, 휴게실 : 1인당 1.9㎡, 그밖의 대상물 : 1인당 3㎡로 나누어 산정 ☞ 강 당 : 150명이하 면적 150㎡, 1인 초과시 마다 0.8㎡ 더함

【스페이스 프로그램】

	실 명		산정면적(㎡)	비율(%)	비고
이용공간	북카페 및 휴게실		120.00	7.60
	다목적강당		150.00	9.51
	그룹동아리실(자치활동실)		45.00	2.85
	특성화 수련활동장	댄스연습실	90.00	5.70
		가사,요리실습실	60.00	3.80
		음악실	45.00	2.85
		노래연습실	45.00	2.85
		네일아트 창작실	30.00	1.90
		게임실	30.00	1.90
		스튜디오실	30.00	1.90
	방과후아카데미 전용교실-1		45.00	2.85
	방과후아카데미 전용교실-2		45.00	2.85
	강의실		60.00	3.80
계			795.00	50.38
관리공간	방과후아카데미 지도자실		20.00	1.27
	관리 및 양호실		30.00	1.90
	상담실		20.00	1.27
	회의실		15.00	0.95
계			85.00	5.39
부속공간	장애인용 EV		-	-
	장애인화장실(남)		6.00	0.38
	장애인화장실(여)		6.00	0.38
	화장실(남)		30.00	1.90
	화장실(여)		30.00	1.90
	물품보관실		40.00	2.53
계			112.00	7.10
설비공간	기계실		20.00	1.27
	전기실		20.00	1.27
계			40.00	2.53
공용공간	홀 및 복도		477.00	30.23
	방풍실-1		12.00	0.76
	방풍실-2		7.00	0.44
	직통계단		50.00	3.17
계			546.00	34.60
합계			1,578.00	100.00

2. 토목분야

가. 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

나. 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

다. 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수 계획평면도는 세분하여 작성한다.

3. 조경분야

가. 식재수종은 기능에 따라 선정하고, 보존가치가 있는 식물은 이식 될 수 있도록 설계에 미리 반영한다.

나. 조경은 법적인 요건을 검토하여 쾌적한 녹지환경이 되도록 하고 주변의 생태환경을 고려하고, 기존 조경은 훼손을 최소화하며, 환경 친화적인 방법으로 복구방안을 수립한다.

다. 오염에 강하고 계절감이 있는 수목구성으로 생동감 있는 분위기를 조성한다.

라. 조경은 대지주변 현황분석 및 건축물 특성을 감안하여 계획하여야 한다.

마. 휴게공간의 시설물은 현대적 감각에 의한 시각적 안정 및 주변환경과 어울리는 환경 친화적인 재료를 선정한다.

바. 차량동선 및 보행자 동선, 건물내부 이용공간 등을 고려하여 적절한 휴게공간, 수경공간, 녹지공간을 종합적으로 고려하여 계획하여야 한다.

4. 기계설비분야

가. 공통 일반사항

1) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기, 기타 조건에 적합하게 설계한다.

2) 냉난방, 환기, 공기조화, 위생, 소화 및 자동제어설비등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계전 반드시 발주처와 협의하여 설계를 진행하여야 한다.

5. 전기설비 분야

가. 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

나. 토목, 건축, 기계, 통신, 소방등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

다. 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모할 수 있어야 한다.

라. 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

마. 최근 개정된 법령중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

6. 정보통신 분야

가. 시설 및 주요실별 수요를 감안한 미래지향적이며 충분한 용량을 확보한다.

나. 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

다. 설계시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다

■ 서 식

<서 식  목 록>

1. 건축설계공모 응모신청서〔서식 1〕

2. 청렴서약서〔서식 2〕

3. 대표자선임계〔서식 3〕

4. 공동응모협정서〔서식 4〕

5. 위임장〔서식 5〕

6. 사용인감계〔서식 6〕

7. 설계공모 참여자 명단 〔서식 7〕

8. 건축설계공모 서면질의서〔서식 8〕

9. 건축설계공모 참여(작품접수) 신청서〔서식 9〕

10. 설계도면 및 설명서 표지규격〔서식 10〕

11. 설계개요 및 시설면적표〔서식 11〕

12. 면적산출표〔서식 12〕

13. 관계법규 검토서 〔서식 13〕

14. 개략공사비 산출내역서〔서식 14〕

15. 심사후 입상작 확인용〔서식 15〕

16. 작품확인용 규격 봉투〔서식 16〕

〔서  식 1〕

건축설계공모 응모신청서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주민등록번호
	주 소			전화번호
				FAX번호
				E-MAIL
공동응모	업 체 명 (건축사)			사업자등록번호
	소 재 지			전화번호 (FAX번호)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	주 소			전화번호 (FAX번호)
청주시에서 시행하는 『상당 청소년문화의집 건립사업 건축설계공모』에 있어서 입찰공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제7장 공동계약 운영요령[별첨 1] ․ [별첨 2]의 공동수급협정서와 <별지 제2호 서식>을 첨부함. 2025. . . 신청인 : (인) (대표자) 청주시장 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
건축설계공모 응모신청 접수증
※ 접수번호 :							접수인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

〔서  식 2〕

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 상당 청소년문화의집 건립사업 건축설계공모

□ 발주기관 : 충청북도 청주시

당사는 『상당 청소년문화의집 건립사업 건축설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유 여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2025.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

청주시장 귀하

〔서  식 3〕

대 표 자 선 임 계

본인은 청주시에서 시행하는 상당청소년문화의집 건립사업 건축설계공모에 관한 모든 권한을 ○○○ 건축사사무소 공동대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2025.    .   .

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

○○○ 건축사사무소  대표건축사 ○○○ (인)

청주시장 귀하

〔서  식 4〕

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 상당 청소년 문화의집 건립사업 건축설계공모를   (    )와 (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원 및 참여비율은 다음과 같다.

1. 업체명 :          (소재지 :       대표자 :       참여비율(%) :   )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2025.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모 업체(자)의 구성원

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

〔서  식 5〕

위    임    장

대표자	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	소 속 (업체명)		연락처
청주시에서 시행하는 『상당 청소년문화의집 건립사업 건축설계공모』에 응모함에 있어 상기인을 대표자의 대리인으로 위임하였음을 증명합니다. 2025. . . 대표자 : (인) 대리인 : (인) 청주시장 귀하
※ 첨부서류 : 재직증명서 1부(업체의 경우) ※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함 ※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

〔서  식 6〕

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 청주시에서 시행하는 『상당 청소년문화의집 건립사업 건축설계공모』에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년    월      일

주  소 :

상  호 :

대표자                            (인)

청주시장 귀하

〔서  식 7〕

설계공모 참여자 명단

본인은 청주시에서 시행하는 『상당 청소년문화의집 건립사업 건축설계공모』에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2025년    월      일

응모대표자 : 소속       직위         성명           (인)

청주시장 귀하

〔서  식 8〕

설계공모 서면질의서

◦ 대 표 자 :                    (인)

◦ 업 체 명 :

◦ 소 재 지 :

◦ 연 락 처 : ☏          (FAX           )

◦ E-MAIL :

지침서 쪽 수	질 의 내 용
	※ 구체적으로 기재 하되 내용이 많을 경우 별지 작성가능. ※ 질의서는［우편(기한 내 도착분에 한함), 직접제출, FAX로만 접수하며, 근무 시간 내 수신 여부 반드시 확인. ※ 제출 시 질의서 이외에 대표사의 공문서를 함께 제출 (기간 중 09:00 ~ 18:00 전화 : 043-201-1252)

청주시장 귀하

〔서  식 9〕

설계공모 참여(작품접수) 신청서

접수번호
신 청 인	업 체 명		소재지
	대 표 자		전화번호 (FAX번호)
	공동응모자 (업체명 및 대표자)		소재지
			전화번호
청주시에서 시행하는 『상당 청소년문화의집 건립사업 건축설계공모』에 참가 작품을 아래와 같이 제출 합니다 2025. . . 대표자 : (인) 청주시장 귀하

---------□-------------- 절 취 선 --------------□---------------

설계공모 참가작품 제출확인서

접수번호					접 수 인
대표업체	업체명		전화번호
	소재지		FAX번호
			E-MAIL
	대표자		주민등록 번 호

〔서  식 10〕

설계도면 표지규격 (A3,횡)

100mm
상당 청소년문화의집 건립사업(안)
◦“글씨체” 휴먼명조 30 Point ◦“위치” 가운데 정렬 ◦“장평” 100% “자간”0%

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성시에는 선이 없음

※ 장평(100%), 자간(0%) 줄간격(180%) 유지할 것

〔서  식 11〕

설계개요 및 시설면적표(예시)

구 분			면 적		비 고
건물개요	사 업 명
	대 지 위 치
	지 역 지 구
	대 지 면 적		㎡
	건 축 면 적		㎡
	연면적	전 체	㎡
		지 하	㎡
		지 상	㎡
	건 폐 율		%
	용 적 율		%
	구 조
	층 수
	최 고 높 이		m		ㆍ단면도에 층고 및 높이 표기
주차개요	계		대	대	ㆍ법정대수 산정 근거 표기
	지 상		대	대
	지 하		대	대
주 차 장 면 적			㎡	㎡	ㆍ산출근거 표기
주차 1대당 바닥면적			㎡/대	㎡/대
설 비 개 요
외 부 마 감
조경개요	조 경 면 적				ㆍ법정조경 : % ㆍ설계면적 : % (산출근거 구체적으로 표기)
	식 재 면 적
	조경시설면적

※ 소수점 3자리에서 사사오입.

〔서  식 12〕

면적 산출표(예시)

◦ 전체 면적표                                          단위 : ㎡

구 분	바 닥 면 적 (㎡)			용 도	비고
	소 계	전 용	공 용
총 계
...

※ 소수점 셋째자리에서 절사하여 둘째자리까지 표현

※ 평가자가 정확성 여부를 쉽게 판단할 수 있도록 작성하여 첨부

〔서  식 13〕

관 련 법 규  검 토 서(예시)

법 규	조 합	대 상	법적기준	설계적용	비 고

〔서  식 14〕

- 개략공사비 산출내역서 -

(단위 : 천원)

구분	공 종 명	재료비	노무비	경비	계	㎡당 금액	구성비
건축공사	소 계
	가설/철거공사
	골조공사
	조적, 방수공사
	창호공사
	수장공사
	마감공사
	기타잡공사
토목공사
인테리어공사
조경공사
기계설비공사(소방포함)
전기설비공사(소방포함)
통신공사
폐기물처리비
합 계
제 경 비
부가가치세
총 공사 금액

〔서  식 15〕

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	상당 청소년문화의집 건립사업 건축설계공모
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

〔서  식 16〕

규 격 봉 투
<뒤 면>	<앞 면>
										접는 선
	청주시장 귀하
	상당 청소년문화의집 건립사업 건축설계공모 응모작품 확인용
										20㎝
	(서식15. 심사후 입상작 확인서 재중)
	□□□□□□□□□ 접는 선 □□□□□□□□□□□ 10㎝