제안공모설계지침서 『함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업 (리모델링) 설계용역』

2025. 04.

	함 안 군
	(주민복지과)

목 차

Ⅰ. 사업개요	1

1. 목적	1

2. 사업 개요	2

Ⅱ. 공모개요 및 방법	3

1. 설계공모의 목적	3

2. 설계공모의 방법	3

3. 설계공모 조직	3

4. 참가자격	4

5. 공모일정	5

6. 참가등록	6

7. 현장설명회	7

8. 질의 및 응답	7

9. 제안공모 제안서 제출	7

10. 제안서 발표	8

Ⅲ. 설계의 기본방향 및 주안점	9

1. 설계의 기본방향	9

2. 공종별 리모델링 범위	9

3. 철거공사 특기사항 공통	10

4. 에너지 효율화 등 지속가능성 제고 방안	10

5. 일반사항	10

6. 시설규모 및 공간조정 내역	12

Ⅳ. 제안공모 제안서 작성 및 제출	15

1. 수행 계획 및 방법-제안과제	15

2. 제안서 작성 일반사항	17

3. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준	17

V. 제안서 심사	20

1. 심사위원회 구성	20

2. 평가 주안점	21

3. 심사 방법	22

4. 제출 공모안에 대한 지적 소유권	25

5. 기타	25

6. 당선작 선정 이후 조건	25

Ⅵ. 관련자료	27

1. 렌더링하지 않은 3차원 이미지의 예시	27

2. 위치도 및 건물전경	28

Ⅶ. 서식자료	29

제안공모 설계지침서

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업의 목적

가. 사업의 목적

1) 금회 사업대상인 기존 함안군 청소년수련관의 변화하는 대내외적 환경변화에 적극 대응할 수 있는 공간 재배치 및 리모델링을 위한 설계계획 수립

2) 미래지향적 교육·학습공간, 체육·운동시설·예술활동, 디지털 미디어공간 등 복합문화공간으로서의 청소년수련관의 역할을 제공하고 청소년 중심의 공간 구성.

3) 기존의 함안군 청소년수련관은 학습공간 위주 시설배치로 급변하는 청소년 문화욕구 충족과 자유로운 수련활동을 소화하기엔 부족 하였으며, 다양한 프로그램 운영에 제약이 많아 리모델링을 통한 공간적 제약 해소 기대

4) 2023년 함안군 청소년 100인 토론회 청소년참여활동 4가지 정책제안 중 『청소년 전용 다용도 활동공간 마련』, 『함안 내 청소년들이 함께하는 공간만들기』 청소년 의견을 함안군에 제안하였으며, 이에 2024년 청소년 수련관 리모델링을 계획하고 공간구성 시 청소년의 의견을 적극 반영하여 청소년 전용 맞춤 공간 조성에 대한 답변함.

▸100인 토론회와 지자체의 답변서의 내용을 기초로 2024년 함안군청소년 참여위원회와 함안군청소년수련관 청소년운영위원회의 공동 의견수렴 활동을 진행

5) 노후된 청소년수련관 내부 시설을 리모델링하여 변화된 청소년들의 문화욕구 충족과 자유로운 수련활동 등 다양한 프로그램 운영을 통하여 부족한 청소년 프로그램 운영공간 확충 및 다양한 체험과 자율적 참여활동공간을 위한 플랫폼 구축이 필요하므로 해당 사업 추진이 필요

2. 사업 개요

가. 공모명 : 함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업(리모델링)설계 제안공모

나. 위  치 : 경상남도 함안군 가야읍 말산1길 10 (함안군 청소년수련관)

다. 사업규모

[대상건물] 함안군 청소년수련관(리모델링)

<대상 건물 현황 >

건물명	준공연도	연면적	건축면적	층수
함안군 청소년수련관 (리모델링)	2015년	3,115.96㎡	720.48㎡	지하1층 / 지상4층

라. 사업내용

- 기존 함안군 청소년수련관 전체 공간 재배치 , 환경개선 및 리모델링

	< 함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업(리모델링) 사업내용 >
• 청소년수련관의 노후화된 시설을 최첨단 IT시설, 쾌적한 학습공간, 복합문화 공간을 제공하는 학습과 문화·휴식이 복합된 신개념 청소년수련관 실현. • 4차산업 체험관 설치: 스마트 체험공간 • 청소년 활동공간 설치: 댄스연습실, 놀이공간, 노래 및 밴드연습실 등 • 노후 설비시설물 개선 (기계,전기,통신,소방,냉·난방 설비등 전분야에 대한 검토 및 발주처 협의 후 리모델링 범위 결정)) • 기타 발주처에서 요구하는 부분에 대한 검토 및 반영 ※ 사업내용에 대하여 우선순위부터 예산범위 내에서 최대한 반영

∙ 건축물 특기사항

- 청소년수련관: 기존 청소년수련관의 공간을 4차산업 체험 및 미래지향적       공간으로 재구성하여  디지털시대에 맞는 플랫폼구축

마. 총 공사비 : 1,571,000천원 (부가가치세 포함)

바. 예정 설계용역비(예정사업비) : 117,000천원 (부가가치세 포함)

※ 제시된 공사비는 인테리어설계비, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 철거, 폐기물 처리 등에 대한 총비용임

※ 인증비는 미포함(인증대상 아님)

사. 주요시설 및 용도 : 수련시설

아. 지역지구 : 제2종일반주거지역

자. 용역기간 : 착수일로부터 180일

차. 실별 규모(space program)와 산출근거

※ 세부시설의 용도와 면적을 연관성이 큰 시설끼리 묶어서 제시하며,

공용공간은 별도 구분하여 표기

※ 공사의 범위 : 바닥, 천정, 냉·난방설비, 전기설비, 소방설비,

비내력벽 리모델링.

※ 실별 면적은 10%이내에 증가·감소 할 수 있으며, 설계자의 의도에

의해 층별 소요실을 변경할 수 있다.

Ⅱ. 공모개요 및 방법

1. 설계공모의 목적

청소년수련관 부분 리모델링 통해 다양한 체험 공간 확충 및 이용환경 개선으로 청소년들의 건강한 성장과 문화욕구를 충족하여 청소년의 진로체험 기회 제공 및 미래사회 인재를 양성할 수 있는 개방적이고 창의적인 설계(안) 계획을 위해 설계제안 공모 시행

2. 설계공모의 방법 – 제안공모

가. 사업의 주요내용에 관련된 건축설계 아이디어를 우선적으로 발굴하기 위함

나. 본 용역은 설계자 선정 후 발주처와의 긴밀한 협의를 통해 설계안을 완성해나가는 방식으로 진행될 예정으로, 본 제안공모에서는 완성된 설계안을 요구·평가하는 것이 아니라, 설계자의 경험과 역량, 수행계획 및 방법 등을 기술한 제안서를 종합적으로 평가하는 것이며 사업의 특수성을 잘 이해하여 기술적이고 전문적인 설계를 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가하여 과업 수행에 적합한 설계자를 선정하고자 함

3. 설계공모 조직

가. 시행․주관기관은 함안군청 주민복지과(이하 ‘발주처’라 한다)이다.

나. 발주처는 본 설계공모에 관한 일체의 업무를 주관하고 설계공모 결과에 따른 제반사항을 시행한다.

다. 연락처

-주  소 : 경상남도 함안군 가야읍 말산로 1번지

-연락처 : 055-580-2383 / kuro@korea.kr

라. 공식홈페이지 (이하 “홈페이지”라 한다) : http://공모전.kr

1) 설계공모 참가에 필요한 모든 정보는 홈페이지에 기재한다.

2) 발주처는 공지사항, 질의회신 및 지침서 등을 홈페이지를 통하여 제공한다.

3) 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 발주처에 이의제기할 수 없다.

마. 공모관리 기관

1) 마실와이드 02-6010-1022(내선2) ※업무시간 : 10:00~17:00

2) 전자우편 : competition@masilwide.com

4. 참가자격

가) 건축사법에 의한 건축사 면허소지자로 건축사사무소를 개설하고 있는   자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

나) 설계공모 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 기타 이와 유    사한 행정처분을 받은 자는 응모 할 수 없음.

『추후 행정처분 사항이(영업정지 등) 확인될 시 응모 자격 취소』

다) 공동 응모 시 동 응모자 모두 “가)항” 및 “나)항”의 자격조건을 모두 갖추  어야 하며, 출자비율이 50% 이상을 가진 자를 대표자로 하여야 하며. 공동수급 총 업체수는 2개 이내로 제한 함.
(공동 응모시 공동수급표준협정서 제출)

※ 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없음.

라) 외국건축사면허(자격)를 취득한 자는 상기 가)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여가능.

마) 설계 당선자는 설계용역 계약 체결 시 전기, 통신, 소방분야 설계 자격이  없는 경우, 관련 법령에 의한 설계자격을 보유한 자와 공동도급(분담이  행방식)으로 계약체결하여야 하며, 이 경우 당선된 자(공동응모자의 경우 대표자)가 대표자가 된다.

바) 국가계약법 제31조5 및 같은 법 시행령 제93조제1항에 따라 조세포탈  등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날로부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰자격이 제한됨.

5. 공모일정

구 분	일 시	비 고
공모 공고	2025.04.24.(목)	□조달청(나라장터), 세움터, 함안군청, 설계공모 홈페이지 공고
참가 등록	05.07.(수) 16:00까지	□설계공모 홈페이지를 통해서만 접수
현장설명회	-	□별도 현장 설명회 없음
질의 접수	2025.04.28.(월) ~05.07.(수) 16:00까지	□설계공모 홈페이지를 통해서만 접수
질의 답변	2025.05.09.(금)	□설계공모 홈페이지 ‘질의회신’ 게시판 일괄 게재
공모제안서 제출	2025.05.21.(수) 10:00∼16:00	□설계공모 홈페이지를 통해 온라인 제출
사전심사	2025.05.26.(월)	□7팀 이상 제출시 발표대상자 5팀 선정 (서면심사, 투표제)
제안서 발표 및 심사	2025.06.05.(목)	□발표심사 (장소 및 시간 추후공지) □업체당 20분 (제안설명:10분,질의응답:10분)
심사결과 발표	2025.06.11.(수)	□함안군청 홈페이지 및 세움터 게재 □당선자에 한하여 개별통지

※ 상기 일정은 발주처의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 일정변경 또는 추가제공 정보 등은 설계공모 홈페이지에 게재할 예정이므로 제안공모 참가자는 홈페이지를 수시로 확인하여야 하며, 확인하지 못하여 발생하는 불이익 책임은 참가자에게 있음

6. 참가 등록

가. 등록기간 : ‘5. 공모일정’ 참조

나. 등록방법 : 설계공모 홈페이지 ( http://공모전.kr )를 통해 온라인 등록만 가능

1) 홈페이지에 접속하여 [ 회원가입(로그인) → 공모 → 해당 공모전 선택 → 참가 신청] 후, 공모 홈페이지 안내에 따라 필요한 사항을 입력하여 등록을 완료하며, 이때 부여하는 고유식별 번호를 통해 공모기간 동안 참가자와 제출 자료를 식별한다.

2) 등록기간 내 정보 변경은 가능하며, 참가 등록 기간 이후에는 어떠한 수정도 할 수 없다.

3) 공동응모의 경우 홈페이지 등록은 대표건축사만 진행하며, 참가자 자료의 경우도 대표건축사를 통해 제공된다.

4) 공고일 현재 관계법령에 따라 등록취소·영업정지·자격정지·휴업 중인 건축사 또는 건축사사무소는 참가등록을 할 수 없다.

나. 등록 시 제출서류

본 설계공모에 참여하고자 하는 자는 등록기간 내에 다음의 서류를 지참하고 등록 접수하여야 한다.

1) [서식1] 건축설계 제안공모 참가신청서 1부.

2) [서식2] 제안공모 참여자 명단 1부.

3) [서식3] 대표자 선임계 1부 (공동응모시)

4) [서식4] 공동응모협정서 1부.(공동응모시)

5) [서식5] 청렴서약서 1부.

6) [서식6] 서약서 1부.

7) [서식7] 사용인감계 및 인감증명서 1부.

(법인은 법인등기부등본 및 법인인감증명서)

8) [서식8] 위임장 1부.(대리인 등록시)

9) [서식14] 사전접촉금지 서약서 1부.

10) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증 사본 각 1부.

(공동응모시 개별 제출)

11) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 행정처분 사항 증빙서류 1부.

(공동응모시 개별 제출, 공고일 기준 1개월 이내)

7. 현장설명회

본 사업의 현장설명회는 실시하지 않으며 서면 질의로 갈음한다.

8. 질의 및 응답

가. 질의접수기간 : ‘5. 공모일정’ 참조

나. 제출방법 : 설계공모 홈페이지 ( http://공모전.kr )를 통해 온라인 접수만 가능

※ 방문, 우편, 팩스 등 접수 불가

※ 질의접수 기간은 설계공모 일정에 명시된 기간으로만 한정하며,

기간 이후에는 질의접수를 받지 않는다.

※ 질의접수와 관련한 모든 책임은 대표사에게 있으며, 질의에 대한 답변은 설계공모 공고 및 지침에 대한 추가 또는 수정본의 효력이 있다.

※ 접수된 질의 내용이 본 공모 또는 지침서와 관련이 없는 경우에는 답변하지 않는다.

다. 질의답변

1) 일시 : ‘5. 공모일정’ 참조

2) 방법 : 설계공모 홈페이지 상단 ‘질의회신’ 게시판에 회신일 일괄 게재

9. 제안공모 제안서 제출

가. 방문제출일시: ‘5. 공모일정’ 참조

나. 제출방법: 설계공모 홈페이지 ( http://공모전.kr )를 통해 온라인 제출만 가능

※ 상기 제출일시 외에는 방문제출 불가, 제출물의 수정 변경 보완 불가

※ 모든 제출서류는 PDF로 저장하여 하나의 압축파일로 압축하여 제출한다.

※ 방문, 우편, 팩스 등 접수 불가

※ 규정된 제출도서 목록 이외의 추가 도서류 및 모형 등의 제출 불가

다. 제출서류

1) [서식10]건축설게 제안공모 제안서 제출서

(설계공모 참여자 명단 포함) 1부

2) [서식11]담당건축사의 경력 및 실적 1부

3) [서식13]건축설계 제안공모 제안서 1부

※ 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등(업체명 포함) 표기(식) 불가하며, 위반 시 실격 처리

5) 담당건축사 경력증명서 및 유사프로젝트 실적증명서 각 1부

6) [서식15]심사위원 사전접촉 여부확인서 1부

※ 사본 제출 시 ‘사실과 상위없음’ 표기 후 인감 날인하여야 하며, 공동응모의 경우 구성원에 대한 일체 서류 제출

10. 제안서 발표

가. 일 시 : ‘5. 공모일정’ 참조

※ 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

나. 장 소 : 함안군청 대회의실(경상남도 함안군 가야읍 말산로 1번지)

다. 발표자 : 업체대표(공동응모사 대표 포함) 또는 담당건축사
(담당건축사 발표 전 [서식7]위임장 및 재직증명서 제출)

라. 심사방법 : 서면심사, 제안발표 및 질의응답

※ 응모업체가 6개를 초과할 경우, 원활한 심사를 위해 사전심사(서면심사, 투표제)를 통과한 업체를 대상으로 최종심사

마. 발표내용 : 설계자의 기술제안·대응능력·경험·역량, 수행계획 및 방법 제안

바. 기타사항

1) 발표순서는 당일 추첨으로 순서를 정하며, 신분증 및 재직증명서(대표자의 경우 미지참)를 지참하여 추후 공지하는 대기장소로 지정한 시간 내에 도착(입실)

2) 담당건축사가 빔프로젝터를 활용하여 자료를 설명하며, 업체를 인지할 수 있는 어떠한 내용도 불허

3) 기제출한 제안서 자료로만 발표하며, 별도 발표자료를 지참하지 아니함

4) 업체당 제안서 발표시간 10분, 질의응답 10분 내외로 진행하고 질의응답시간은 심사위원의 결정에 따라 변경할 수 있음

※ 참가업체는 최소 발표인원만 참석(2인 이내)

Ⅲ. 설계의 기본방향 및 주안점

1. 설계의 기본방향

가) 최근 청소년수련관의 트랜드를 고려하여 국내․외 청소년수련관 시설 선진사례를 면밀히 검토, 반영하여 합리적인 조닝(zoning)계획 및 평면계획을 수립하여 공간환경 계획

나) 외부공간의 연계 배치 등을 고려한 종합적인 건축계획

다) 획일적인 공용공간을 지양하고 쾌적하고 건강한 장소가 될 수 있도록 아이디어를 제안

라) 내부공간 구성 및 유효면적은 공간활용의 효율성을 최대로 높여 계획

마) 건물의 재료는 자연친화적인 재료를 사용하거나 무독, 무해한 재료로 마감하여 자연환경과 친화되고 질적으로 개선된 환경이 조성되도록 계획

바) 에너지절약을 구현할 수 있는 건축계획 및 에너지절약 기법을 평면, 외피, 개구부 계획 등을 반영하고, 패시브 계획 및 액티브 시스템을 통한 건물의 에너지 요구량을 최소화하여 에너지가 절감되도록 계획

사) 사용자 편의성 및 사용자별 시설 이용정도를 고려하는 적절한 공간 계획을 수립

아) 리모델링 주요 공사내용을 예산범위 내에서 최대한 반영

2. 공종별 리모델링 범위

가) 건축공사

내·외부 공간 구성에 따른 바닥재 및 벽면 마감재, 청소년 활동공간 설치, 야외 활동공간 설치, 4차산업체험관 설치 외 발주처가 요구하는 리모델링 공사 범위에 대한 종합적인 검토와 반영 및 이에 수반되는 기존 시설 철거공사 등

나) 기계설비공사

장비설치공사, 위생기구설치공사, 급수급탕 배관공사, 오배수 통기관 배관  공사, 가스배관공사, 환기배관공사, 바닥난방공사, 냉.난방기 설치공사, E.V 교체공사 및 이에 수반되는 기존 시설 철거공사 등

다) 전기설비공사

전력간선공사, 냉.난방설비공사, 전열공사, 전등공사 및 이에 수반되는 기존 시설 철거공사 등

마) 통신설비공사

옥외통신간선공사, 옥내통신공사, TV설비공사, CCTV설치공사, 방송설비공      사 및 이에 수반되는 기존 시설 철거공사 등

바) 소방시설공사

소화배관공사, 임시소방설비설치공사, 옥내소화배관공사 및 이에 수반되는      기존 시설 철거공사 등

3. 철거공사 특기사항 공통

가) 청소년수련관

1) 기존 비내력벽, 천정, 바닥 등 리모델링시 필요한 철거공사 일체

2) 사전조사를 면밀히 하여 누락되지 않게 철거계획 검토

3) 기존시설과 조화롭게 연계

4. 에너지 효율화 등 지속가능성 제고 방안

가) 친환경 기준 적용의 적정성

⦁ 리모델링 사업으로 건축물 에너지효율 등급 및 녹색건축 인증 의무   대상에 해당하지 않으나 에너지효율 향상을 위해 적극 검토

나) 장앤인편의 기준 적용의 적정성

⦁ 리모델링 사업으로 ‘장애물 없는 생활환경 인증’ 의무 대상에 해당하지  않으나 장애인 사용자의 편의를 고려하여 인증에 준하는 계획 검토

다) 경제성 제고

⦁ 설계 시 LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감방안    계획 검토

5. 일반사항

가) 기존 설비 및 그 밖에 상수도, 오배수, 소방, 자동제어 등에 대한 연계활용을 검토하여 공사비 절감 및 유지관리의 효율화를 마련할 것

나) 공사비는 총 예정사업비를 초과하지 않도록 설계하고 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 화려한(고비용) 마감은 지양

다) “공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정”등에 의거 건축물 에너지효율 향상, 고효율 에너지기자재 사용, 자연에너지 이용을 극대화 등을 위한 건축물 인증에 준하는 설계안 제시

라) 방범, 방재 등에 편리하고 유지 관리가 용이한 시설계획을 유도

마) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 보안관리가 용이한 구조로 설계

바) 장애인이 이용하기에 불편함이 없도록 장애자 동선, 편익시설 등에 대한 계획을 종합적으로 수립 반영

사) 기계, 전기 부분 LCC분석을 통해 에너지 절약 및 유지 관리비가 절감되는 시스템 및 장비를 선정해야 함

아) 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주자와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 때에는 발주자의 해석에 따름

6. 시설규모 및 공간조정 내역

가) 청소년수련관 층별면적 및 실현황(기존)                      (단위 : ㎡)

구분	층별	면적(㎡)	실명
청소년수련관	지하1층	594.27	음악실, 댄스실, 창고, 복도, 기계실, 전기실, EV실, 계단실. 펌프실
	1층	695.43	탁구장, 방과후아카데미, 북카페, 사무실 및 당구장, 로비. 복도, 방풍실, 화장실, EV실, 계단실.
	2층	661.58	청소년상담복지센터, 학교밖청소년센터, 사무실, 교육실, 복도, 화장실, EV실, 계단실.
	3층	679.94	교육실, 독서실, 급식실, 통신실, 복도, 화장실, EV실, 계단실
	4층	484.74	교육실, 다목적실(강당), 홀, 화장실, EV실, 계단실
	합 계	3,115.96

나) 청소년수련관 층별면적 및 실현황(수선(리모델링))          (단위 : ㎡)

구분	층별	면적(㎡)	실명
청소년수련관	지하1층	458.93	노래연습실. 스마트 체험공간, 셀카존 및 밴드연습실, 공용공간
	1층	668.79	댄스연습실, 북&스터디카페, 놀이공간, 공용공간
	2층	106.92	사무실
	3층	185.04	스마트활동실, 교육실, 공용공간
	4층	14.84	다목적실 (강당)
	합 계	1,434.52

※ 리모델링 설계시 세부시설에 대하여는 발주청과 협의하에 조정 될 수 있음.

※ 세부시설의 용도와 면적을 연관성이 큰 시설끼리 묶어서 제시하며, 공용공간은

별도 구분하여 표기

※ 공사의 범위 : 바닥, 천정, 냉·난방설비, 전기설비, 소방설비, 비내력벽

리모델링.

※ 실별 면적은 10% 이내에 증가·감소 할 수 있으며, 설계자의 의도에 의해 층별

소요실을 변경할 수 있다.

다) 청소년수련관 리모델링 면적개요

층 별	세부시설 설치계획	수용인원	운영주체
지상 4층	-다목적실(강당) : 14.84㎡ -기존 교육실 -기존 계단실 -공용공간(홀,화장실,E.V실,복도 등) 수선(리모델링) 합계면적 : 14.84㎡	100명 (유동인구)	위탁 (한가람문화재단)
지상 3층	-스마트활동실1,2 : 85.14㎡ -교육실4 : 33.66㎡ -공용공간(홀) : 66.24㎡ -기존 교육실(1,5) -기존 미술실 -기존 요리실 -기존 통신실 -기존 계단실 -기존 공용공간(화장실,E.V실,복도 등) 수선(리모델링) 합계면적 : 185.04㎡	100명 (유동인구)	위탁 (한가람문화재단)
지상 2층	-사무실 : 106.92㎡ -기존 청소년상담복지센터 및 청소년공간 -기존 회의실 및 방과후교실 -기존 계단실 -기존 공용공간(홀,화장실,E.V실,복도 등) 수선(리모델링) 합계면적 : 106.92㎡	100명 (유동인구)	위탁 (한가람문화재단)
지상 1층	-댄스연습실 : 105.60㎡ -창의적 놀이공간 : 118.80㎡ -북&스터디카페 겸 복합문화공간 : 228.42㎡ -공용공간(남화장실) : 11.22㎡ -공용공간(로비,계단실,복도) : 204.75㎡ -기존 공용공간(E.V실 등) 수선(리모델링) 합계면적 : 668.79㎡	100명 (유동인구)	위탁 (한가람문화재단)
지하 1층	-노래연습실 : 105.60㎡ -스마트 체험공간 : 118.80㎡ -셀카존 및 밴드연습실 : 54.00㎡ -공용공간(화장실) : 6.0㎡ -기존창고 및 계단실 : 55.19㎡ -공용공간(복도,홀) : 119.34㎡ -기존 기계설비실(전기실,발전기실 등) -기존 공용공간(E.V실 등) 수선(리모델링) 합계면적 : 458.93㎡	100명 (유동인구)	위탁 (한가람문화재단)
수선(리모델링)면적합계(㎡)	1,434.52㎡

※ 실별 면적은 10% 이내에 증가·감소 할 수 있으며, 설계자의 의도에 의해

층별 소요실을 변경할 수 있다.

※ 공용면적의 경우 층별 총합계 면적 범위내에만 들어가면 됨(변경가능)

라) 청소년수련관 리모델링 주요내역

층 별	구조	주요내역
지상 4층	철근 콘크리트	-. 교육실 유리칠판 및 전자칠판 설치 -. 공용공간(홀 및 계단실) 벽 도색/강제배기장치 설치 -. 다목적실(강당) 무대부 바닥 추가설치/ FL+900까지 벽 마감재 보수 -. 공용부분(화장실) : 변기교체 및 (남)화장실 소변기칸막이 설치 -. 옥상 노후화 된 기존 바닥철거 후 재방수 (예산 가능시) -. 수선(리모델링)외 기존시설 사용
지상 3층	철근 콘크리트	-. 교육실 유리칠판 및 전자칠판 설치 -. 공용공간(홀) 바닥재교체 및 천정 냉·난방기 설치/ 벽 도색/강제배기장 치 설치 -. 공용공간(복도,계단실) 벽 도색 -. 스마트활동실 방음 칸막이 및 폴딩가벽설치 -. 공용부분(화장실) : 변기교체 및 (남)화장실 소변기칸막이 설치 -. 수선(리모델링)외 기존시설 사용
지상 2층	철근 콘크리트	-. 사무실 출입문 이전 및 탕비실 설치 /CCTV 사각지대 추가 및 모니터설치, 화재수신반 이전설치 -. 관장실 칸막이 설치 -. 교육실 유리칠판 및 전자칠판 설치 -. 공용공간(복도) 냉·난방기 설치/ 벽 도색 -. 공용공간(계단실,홀) 벽 도색 -. 공용부분(화장실) : 변기교체 및 (남)화장실 소변기칸막이 설치 -. 수선(리모델링)외 기존시설 사용
지상 1층	철근 콘크리트	-.1층 입구 로비 개수대 설치 -.1층 주출입문 자동문으로 교체 -.댄스연습실 : 디지털장비,전면유리,바닥마감(에폭시 등),방음설치/ 벽면인테리어변경 -.창의적 놀이공간 : 탁구,당구,스크린승마 등 청소년들이 자유롭게 즐길 수 있는 창의적 공간 구축 -.북&스터디카페 겸 복합문화공간 : 편하게 앉거나 누워서 쉴 수 있는 좌식공간과 소규모로 모일 수 있는 별도의 개인공간 구축/ 책장 벽면배치 및 창호교체/ 마루공간 추가설치 -. 공용부분(화장실) : 변기교체 및 (남)화장실 소변기칸막이 설치 -. 공용공간(복도,계단실,로비) 벽 도색
지하 1층	철근 콘크리트	-.노래연습실 : 코인노래방 3개소 설치 및 휴게 로비 공간 조성/ 방음장치 설치 -.스마트 체험공간 : 최신 디지털기기와 기술적 장비들을 구축함으로써 이용자들이 다양한 체험을 경헐 할 수 있는 공간 조성 -.셀카존 및 밴드연습실 : 셀카존 내부 인테리어 및 밴드연습실 악기설치 -.공용부분(화장실) : 변기교체 및 사생활 보호를 위해 불투명한 출입문으 로 교체 -. 공용공간(복도,계단실,홀) 벽 도색 -.지하 습기제거를 위해 환기⦁배습 장치 설치 (별도 덕트 설치 요망)
기타사항		-. 야외마당에 풋살장 및 농구장(반코트) 설치 (바닥재는 운동 시 충격흡수 가능한 마감재 사용) -. 야외주차장 바닥 크랙부분 보수 -. 기존1층 데크와 연결되는 야외산책로 조성 -. 도로쪽 휀스설치 -. 노후화 된 외부계단 및 조명 등 수리 -. 사무실 등 통신 선로 재설치 및 교육실,공용(로비) WIFI 재설치 (통신) -. 공간별 증설작업(필요시)/활동실 벽면에 전기 소켓(전원)추가설치(전기)

Ⅳ. 제안공모 제안서 작성 및 제출

1. 수행 계획 및 방법 제안과제

가. 업무에 대한 이해도

1) 사업목적, 추진배경, 필요성 등을 검토하여 과업의 성격, 범위와 내용을 정의

2) 본 과업과 관련된 인증사항, 관련 법령 등을 검토하여 설계방향에서의 적용방안, 주요한 고려사항 제시

3) 대지여건에 따른 설계, 시공 및 운영 등에 있어서 발생가능한 문제점 도출 및 그에 대한 개선방안, 아이디어 제시

4) 사업부지, 주변 환경을 분석하여 지역적 특성, 이용자의 특성 및 시설 성격을 감안한 설계 주안점 제시

나. 과제에 대한 기술제안

(과제 1) 청소년수련시설 리모델링을 위한 주요 공간조성

-. 기존 시설의 내부 건축마감과 각종 설비를 청소년수련관의

용도와 적합한 시설환경으로 개선하여 효율성 및 편리성 증진.

-. 인테리어 설계를 통하여 청소년을 위한 복합문화공간으로의

리모델링 방향성 확보.

-. 수련관의 사용상 이용객의 실의 배치를 소음발생이 있는

동적공간과 도서 및 학습 위주의 정적공간 분리

(과제 2) 청소년들의 트렌드를 반영한 공간조성

-. 지역 청소년들의 문화욕구 충족을 위한 프로그램 및 공간 마련.

-. 기존 청소년 수련관의 용도 및 기능을 감안한 리모델링 계획.

-. 동선을 최소화 하기위해 이용객이 빈번한 실은 저층으로 배치하고

장시간 머물며 학습하는 공간은 상부층으로 배치

-. 기존 야외마당을 이용해 야외체육활동 및 산책로 공간을 조성하여

청소년들의 생활체육 활성화 및 건강증진에 기여

(과제 3) 첨단 IT기반 청소년수련관 구현 및 최신 트렌드를 반영한 공간조성

-. 청소년수련관 이용자들의 다양성을 충족시키고 효율적인 운영을

위한 IT기술을 접목하여 스마트 청소년수련관을 건립하는데

목적이 있음.

-. 도입되는 IT기술은 주기적인 콘텐츠 변경이 용이하며 사업팀에서

해당 기기의 관리를 최소화할 수 있는 장비를 권장. 특히 단순한

기능이 아닌 이용자 피드백 및 사용통계를 활용하여 이용자의 자

기개발, 교육프로그램 등을 수립할 수 있는 장비로 구축이 필요.

-. 디지털 시대의 정보교류의 장, 새로운 개념의 스터디 공간,

휴식 공간 기능을 겸비한 다기능 복합 공간 구성

-. 조명계획, 인테리어, 색채계획, 사인계획, 로고디자인, ICT솔루션

운영체계에 맞는 통합적 계획

다. 수행계획

1) 수행해야 할 업무의 범위와 내용을 단계별로 분할 후, 단계별 작업계획 및 작업방법 제시(단계별 작업계획은 과업수행일정표를 포함)

2) 단계별 업무수행에 따른 필요 전문가 및 용역 수행팀의 구성계획・운영 일정 제시

3) 설계내용 해석‧자문 등 시공 과정의 설계자 참여 계획을 공사기간 대비 구체적으로 기술(건축서비스산업 진흥법 제22조 “설계의도 구현” 업무 관련)

4) 협의 및 의사결정을 효율적으로 추진하기 위한 체크리스트, 설문실시 등 구체적인 실행방안

5) 수요기관(도서관)과의 요구사항 등 업무협의 내용에 대한 전반적인 현황분석 등 사업반영에 대한 검토 자료 제시

6) 제안공모(안)에 대한 수요기관 업무 협의 등 설명자료 보고서 제시

7) 기타 발주관청이 요구사항에 대한 제반업무 자료 제시 등

2. 제안서 작성 일반사항

가. 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재

나. 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

다. 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용. 다만, 영문이나 한문표기가 필요한 경우 한글과 병기

라. 조감도, 모형, 설계도면 등은 제출도서에서 원칙적으로 제외하며, 제안공모참가자가 제출물에 조감도나 이와 유사한 내용을 포함한 경우에는 심사 시 위반사항으로 보고됨(담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성). 다만, 제안서의 명확한 설명을 위하여 필요한 경우 스터디 모델 수준의 모형사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지(Ⅵ.1. 참고) 등은 추가하지 않음.

3. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

가. 설계공모 제안서 구성

순 서	항 목	세부사항	쪽 수
1	표지	○ 앞면	1쪽
2	목차		1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	○ 담당건축사의 경력 ○ 담당건축사의 유사프로젝트 실적 (최근 10년간)	별도 제출 [서식 11]
		○ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 (최근 10년간, 2작품)	총 2쪽 (작품당 1쪽)
4	수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도	1쪽	5∼8
5		○ 과제에 대한 제안	과제당 2쪽 이하 (총 6쪽 이하)
6		○ 수행계획	1쪽
합계			총 9 ∼12쪽 이하

※표지, 목차, 간지 등도 제안서 총 쪽수에 포함됨

나. 제안서 형식 및 규격

구 분	설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법
용지크기	A3(횡)
여백	자 율
글자체	자 율	자 율
글자크기	자 율	- 본문제목, 소제목 등 : 자율 - 본문내용 : 10포인트 미만 사용 자제
도표, 이미지	자 율
줄간격	자 율
내용 및 순서	- 담당건축사의 대표작품(최근 10년간) 포트폴리오 2점	- 업무에 대한 이해도 - 과제에 대한 제안 - 수행계획

1) 제안서의 표지는 [서식13]을 사용한다.

※ 제출 전자파일에 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등(업체명을 포함)을 표기(식)할 수 없으며, 위반시 실격 처리

다. 설계자의 경험 및 역량 부문 작성기준

1) 경력 및 유사프로젝트 실적

- [서식11]담당건축사의 경력 및 실적을 증빙자료와 함께 별도 제출

- 경력년수는 소수 첫째자리에서 버림하되 12년 이상인 경우 `12년 이상`으로 기재하고, 실적건수는 5건 이상인 경우 `5건 이상`으로 기재

- 경력은 건축사면허(자격)취득일 이후 경력만 인정

- 실적은 (공모공고일 기준) 최근 10년 이내 단일 건으로 건설기술 진흥법 제2조 제6항의 발주처에서 주용도(전체 연면적 50% 이상)가 본 용역의 용도(건축법 제2조제2항에 따른 용도)인 사업 설계용역 완료 실적에 한함

- 실적 증빙은 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리 증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 제출

2) 담당건축사의 대표작품 포트폴리오(A3 작품당 1쪽)

- 최근 10년 이내 2작품 이하 제출

- 프로젝트 및 발주기관 익명처리(예) OOO 설계용역, ◇◇◇ 설계)

- 실제 수행한 프로젝트(본 시설의 용도와 무관)에 한하며, 수행사실 여부의 확인은 경력관리수탁기관의 경력증명서 등에 의하며, 허위사실 판명 시 실격 처리

- 대표작품 이행실적은 참여 지분 50% 이상인 경우만 인정(대표사로 참여했던 프로젝트만 인정)

Ⅴ. 제안서 심사

1. 심사위원회 구성

가. 심사위원회 명단

1) 건축서비스산업 진흥법 제21조, 동법 시행령 제17조, 국토교통부고시 제2023-180호 `건축 설계공모 운영지침`을 준용하여 5인으로 구성된 별도의 설계공모 심사위원회를 구성하여 심사한다.

2) 심사위원 명단

연 번	성 명	소 속	비 고
1
2
3
4
5
예비 1
예비 2

※ 심사위원이 제척·회피·기피 사유가 발생할 경우 예비심사위원으로 대체

나. 심사위원회 운영 : 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함

다. 기밀유지

1) 심사의 진행과정은 온라인으로 생중계 한다.

2) 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀 등을 누설하여서는 안 된다.

3) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별 질의에 응답할 수 없으며, 비밀을 준수하여야 함

라. 심사위원의 제척·기피·회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

- 위원 또는 그 배우자가 심사대상 업체의 당사자 또는 당사자 친족이거나 친족이었던 경우 또는 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

- 위원이 심사대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계 포함)가 되는 경우

- 위원이나 위원이 속한 법인·단체 등이 심사대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

- 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사대상 업체에 임·직원으로 재직한 경우

- 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우
(설계공모 공동응모를 포함한다.)

2) 제안공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관에 제출하여 [서식16]기피신청을 할 수 있음

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 [서식16]회피신청서를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

마. 발주기관은 심사위원의 제척·기피·회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우에는 공모 참가자에게 이를 통지함

2. 평가 주안점(안)

가. 설계자의 경험 및 역량

- 담당건축사의 경력

- 담당건축사의 유사프로젝트 실적

- 담당건축사 대표작품에 대한 설계의 작품성, 창의성 등

나. 수행계획 및 방법

- 업무에 대한 이해도

- 과제에 대한 제안의 적절성, 독창성, 실현성 등

- 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

다. 그 밖의 사항

- 추진의지의 적극성, 공모안 작성요건 위반내용, 기술제안, 대응능력 등

3. 심사 방법

가. 심사 방법

1) 심사 공모안을 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받도록 함

4) 발주기관은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

5) 심사위원회는 해당 공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

6) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

7) 평가방식 : 본 설계공모(제안공모)는 투표제 방식으로 심사함

- 투표에 의해 결선투표 대상자 2개사를 선정한 후, 결선투표를 실시하여, 다 득표자를 당선작으로 선정하고, 결선투표 탈락자와 그 외 득표순으로 순위를 결정하여 과반 이상 찬성으로 기타 입상작으로 선정한다.

- 각 단계별 투표 실시결과 득표수가 동일하여 순위를 가를 필요가 있는 경우 해당 동일 득표자를 대상으로 재투표를 실시하여 순위를 결정한다. 다만, 2회 이상 재투표를 실시한 후에도 순위 결정이 되지 않은 경우에는 심사위원회의 의결을 거쳐 추첨을 통해 순위를 결정할 수 있다.

- 단계별 심사위원의 투표 수는 각 단계별로 선정 공모안 수와 동일하게 부여한다. 단, 심사위원회에서 달리 정할 수 있다.

- 담당건축사의 경력 및 유사프로젝트 실적, 위반사항 등은 제출된 자료에 의거 발주기관에서 사전 확인하고 그 결과를 심사위원회에 보고하여 심사 시 평가에 반영될 수 있도록 한다.

※ 참가업체는 최소 발표인원만 참석(2인이내)

8) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

9) 심사위원은 본 공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

나. 실격기준 및 위반사항

1) 공모안이나 해당 제출자 등이 아래 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있음

- 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

- 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가에 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우

- 설계지침상의 연면적(공고면적)을 과도하게 초과하거나 미달하여 설계한 경우

- 제출도서에 설계공모 참가자를 알 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

- 직·간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

- 심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

- 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

- 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우 등 기타 실격 해당 사항

- 저작권법 및 표절로 인하여 차후에도 밝혀지게 되는 경우

(최종판단에 따라 언제든 당선을 무효화 할 수 있다.)

- 이미 공개된 유사한 작품을 다시 공모안으로 출품하는 경우

(최종판단에 따라 언제든 당선을 무효화 할 수 있다.)

- 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

- 그밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우

2) 공모안이 기준쪽수 초과, 제출부수 부족 등 공모안 작성요건을 위반한 경우 위반내용을 심사위원회에 보고하여 평가 시 불이익을 받을 수 있음

다. 불이익 처분방법

1) 위반사항에 대하여는 해당 제안공모 참가자의 확인을 거쳐 심사 시 심사위원장에게 제출하며, 심사위원회는 이를 평가에 반영토록 함. 다만, 심사대상자가 위반사항에 대한 확인을 거부할 경우 확인절차를 생략하고 심사위원장에게 제출할 수 있음

2) 실격 및 위반사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음

라. 심사결과 발표

1) 심사 결과의 발표 및 공개

- 심사종료일로부터 7일 이내에 심사의 결과(투표결과)를 함안군청 홈페이지(공지사항)를 통하여 공개함. 다만, 입상하지 못한 제안공모 참가자를 비공개할 수 있음

2) 공모안 반환

- 모든 제출물은 온라인 제출로 별도의 반환 과정은 없음.

마. 입상작 선정

1) 입상작은 당선작(1점)과 기타 입상작(1~4점)으로 구분하며 투표제 평가방식을 통해 다 득표 작품으로 결정함

2) 기타 입상작(공모보상비 예산 : 8,000천원)

기타 입상자	계	1순위	2순위	3순위	4순위
1인인 경우	3,000	3,000	-	-	-
2인인 경우	5,000	3,200	2,400	-	-
3인인 경우	6,000	3,200	2,400	1,600	-
4인인 경우	8,000	3,200	2,400	1,600	800

3) 기타 입상자가 4인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로

예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2, 10분의 1을 지급

4) 기타 입상자가 3인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로

예산의 10분의 4, 10분의 3, 10분의 2

5) 기타 입상자가 2인인 경우 : 공모심사 점수가 높은 자 순으로

예산의 10분의 4, 10분의 3

6) 기타 입상자가 1인인 경우 : 3,000천원

7) 입상작 발표일로부터 30일내 보상금 지급을 신청하지 않을 시 보상금에 대한 권리를 포기한 것을 간주한다.

4. 제출 공모안에 대한 지적 소유권

가. 입상작(당선작, 우수작, 가작)은 반환하지 않고 보관할 수 있다.

나. 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 발주기관이 공모에 참여한 자와 협의한 경우에는 예외로 할 수 있다.

다. 입상작에 한하여 발주기관 주관으로 홍보 등을 위하여 전시할 수 있으며, 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

라. 입상작 외의 작품의 경우에도 필요한 경우 전시 또는 출판할 수 있으며 이 경우 응모자의 요청이 있을 때에는 익명으로 처리할 수 있다.

5. 기타

가. 응모자는 제안공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주한다.

나. 본 지침서의 문구해석상 발주기관과 응모자간에 차이가 있을 경우 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관에서 정하는 바에 따라야 한다.

6. 당선작 선정 이후 조건

가. 계약

1) 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 자를 계약대상자로 결정함

2) 설계용역 계약은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 관련 법령의 기준을 따름

3) 계약대상자는 당선작으로 선정된 사실을 통보받은 후 신속히 설계용역 계약에 관하여 협의하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다. 다만, 발주기관의 사정, 사업의 추진여건에 따라 계약상대자와 협의하여 계약체결 기한을 조정할 수 있다.

4) 본 제안공모와 관련하여 당선자가 `건축 설계용역 계약 및 수행에 필요한 법적 요건을 갖추고 있지 못할 경우` 설계권을 취소할 수 있으며, 당선작에 대한 사용권한은 우리 군이 가진다.

5) 계약상대자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 계약상대자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 기타 입상자 중에서 계약상대자를 선정할 수 있다.

6) 설계계약은 별도의 과업이행요청서 또는 지침에 의함

나. 설계 진행

1) 본 제안공모는 기본 및 실시설계를 위한 것으로 계약상대자는 진행과정별로 발주처와 협의하여 설계를 추진하여야 함

2) 계약상대자는 심사위원회의 지적사항, 발주부서의 요구사항 등을 종합하여 당선작에 대한 설계변경 및 보완이 필요한 경우 이를 반영하여야 함

3) 기본 및 실시설계 과업기간 중에 관련법 규정을 이행하여야 할 경우 발주기관이 요구하는 필요한 자료를 제출하여야 하며, 기타 각종 보고회 개최 등 과업으로 요청하는 전반적인 사항은 특별한 사정이 없는 한 이에 따라야 함

4) 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의 인·허가 협의사항에 수반되는 설계도서 및 자료는 발주기관에 적기에 제공하여야 하고, 납품이후 건축협의 및 관련 인·허가 변경, 실시계획변경 등 행정절차 이행에 따른 자료 작성에 적극 협조하여야 하며 이에 소요되는 제반경비 및 비용은 계약상대자(설계자)가 부담하여야 함

5) 납품 후에라도 사정변경으로 필요할 경우 우리군이 설계의 수정, 변경 및 보완을 요구할 수 있으며, 계약상대자(설계자)는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 함

6) 기타 과업 관련사항은 과업이행요청서 및 내부지침 등에 따름

다. 사업의 변경 및 해지 등

1) 과업수행 중이라도 발주기관의 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 계약상대자와 협의하여 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정·변경, 계약을 해지할 수 있음

2) 이 경우 「지방자치단체의 입찰 및 계약집행 기준」등 관련 규정에 따름

Ⅵ. 관련자료

1. 렌더링하지 않은 3차원 이미지의 예시

※출처 : 건축서비스산업 진흥법에 따른 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2)(건축도시공간연구소)

2. 위치도 및 건물전경

1)대상위치: 경상남도 함안군 가야읍 말산1길 10 (함안군청소년수련관)

- 함안군 청소년수련관 전경

2)금회사업 사업범위 전경

Ⅶ. 서식자료

【서식 제1호】

건축설계 제안공모 참가신청서
※ 접수번호
대표 건축사 사무소	업체명 (대표자)		사업자등록번호
			생년월일
	소재지		전화번호
	이메일		FAX번호
공동 응모 건축사 사무소	업체명 (대표자)		사업자등록번호
			생년월일
	소재지		전화번호
	이메일		FAX번호
「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계 제안공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 참가(응모)할 것을 신청합니다. 2025. . . 신청자(대표자) : (인) 함안군청 귀하

【서식 제2호】

제안공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 함안군청에서 시행하는「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계 제안공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2025년     월     일

응모대표자 : 소속                     직위             성명               (인)

함안군청 귀하

【서식 제3호】

대표자 선임계

본인은 ○○○건축사사무소의 대표로서 함안군청에서 시행하는「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계 제안공모에 관한 모든 권한을 대표자 ○○○에게 위임합니다.

2025년     월     일

대표자  상 호 :

주 소 :

성 명 :                 (인)

공동응모자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                 (인)

함안군청 귀하

【서식 제4호】

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」설계 제안공모를 (    )와  (    )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및  구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 ①구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명날인하여 각각 보관한다.

2025년     월     일

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

함안군청 귀하

【서식 제5호】

청  렴  서  약  서

□ 용 역 명 :「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 제안공모 설계용역

□ 발주기관 : 함안군청

당사는 「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계용역과 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 제안공모 심사가 되도록 아래의 사항을 준수하고, 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

가. 특정인의 당선을 위한 담합 등 제안공모의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

나. 당해 제안공모와 관련하여 이유여하를 막론하고 심사위원(대상자 포함)이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

2025년     월     일

○ 공동참여응모 대표업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :	○ 공동참여응모 참여업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :

함안군청 귀하

【서식 제6호】

서     약     서

당사는 「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계 제안공모에 응모함에 있어 제안공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 요청, 지침 및 조정 불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사방법, 심사 결과 등에 대하여는 어떠한 이의 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2025년     월     일

○ 공동참여응모 대표업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :	○ 공동참여응모 참여업체 회 사 명 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 전화번호 :

함안군청 귀하

【서식 제7호】

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 함안군청에서 시행하는 「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계 제안공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2025년     월     일

주  소 :

상  호 :

대표자 :

함안군청 귀하

【서식 제8호】

위  임  장

대리인	성 명		생년월일
	업체명		연락처		☎ :
					HP :
	소재지
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 발주기관에서 시행하는 「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계 제안공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2025년 월 일 업체명 : 대표자 : (인) 함안군청 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
소 재 지
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2025년 월 일 업체명 : 대표자 : (인)

※첨부서류 : 신분증 사본 1부

※위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함

※권한 위임으로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

【서식 제9호】

설 계 공 모  서 면 질 의 서

□ 「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계 제안공모

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
		E-mail
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	질의는 설계공모 홈페이지를 통해 온라인 질의 접수만 가능 본 서식은 사용하지 않음

【서식 제10호】

건축설계 제안공모 제안서 제출서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명		사업자등록번호
	대표자명		생년월일
	주 소		전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명		사업자등록번호
	주 소		전화번호(FAX)
함안군청에서 주최하는 「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계공모에 공모안을 제출합니다. 첨부 : 설계공모 참여자 명단 1부. 설계공모 제안서 및 제출물 일체 ※ 공동응모자가 2개 업체 이상일 경우 공동응모협정서 첨부함. 2 025년 월 일 신청인 : (인) (대표자) 함안군청 귀하

설계공모 참여자 명단

본인은 함안군청에서 시행하는 「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」제안공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

2025년    월    일

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

함안군청 귀하

【서식 제11호】

담당건축사 경력 및 실적

성 명
생 년 월 일
근무처주소지		(전화번호 : )				E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별		인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처		부서		직위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			입상내용	용역금액			발주처

※필요에 따라 경력 및 실적란을 추가하거나 삭제 가능

【서식 제12호】

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20mm
							30mm

【서식 제13호】

<규격 : A3, 횡>

「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」(24pt)

건축설계 제안공모 제안서(35pt)

2025.00.00.(20pt)

함안군청(25pt)

【서식 제14호】

사전접촉 금지서약서

본인은 함안군청에서 시행하는 「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계 제안공모 참가자로서 심사에 영향을 줄 수 있는 심사위원 등과 사전접촉을 포함한 불공정 행위를 하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년    월    일

공모참가자 :                     (서명)

함안군청 귀하

※공모 참가등록서류 제출 시

【서식 제15호】

사전접촉 여부확인서

본인은 함안군청에서 시행하는 「함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업」 설계 제안공모 참가자로서 심사에 영향을 줄 수 있는 심사위원 등과 사전접촉 여부를 아래와 같이 확인합니다.

⊙ 사전접촉 해당여부 :   여 / 부

2025년    월    일

공모참가자 :                     (서명)

함안군청 귀하

※제안서 제출 시 참가등록서류 전체(원본)와 함께 제출

【서식 제16호】

심사위원 기피·회피 신청서

□ 사 업 명 : 함안 청소년 꿈활력충전소 조성사업

□ 기피․회피 위원

성 명	소 속	기피․회피 사유

2025년    월    일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

함안군청 귀하