사업추진계획

1. 공 고 명 : 제천여고 별관 공간재구조화 공사

2. 목  적

제천여고 공간재구조화 공사4차 산업의 발달로 미래사회에 대한 다양한 요구와 변화가 추구됨에 따라, 그에 걸맞은 인재 육성 공간제공

기존의 학교시설은 사회적으로 관리와 통제의 역할을 벗어나 미래사회를 대비하는  미래교육이 실현될 수 있는 학교시설 및 공간 조성.

3. 주요추진 일정계획

번호	내 용	추 진 일 정	비 고
	사업비 확정		2025.1회추경
2	설계공모 추진계획 수립 및 심사위원선정	2025.05.19.
3	공공건축심의위원회 검토	2025.05.
4	설계공모사전규격공개	2025.06.21.~ 06.25.
5	설계공모 시행 및 공고	2025.06.26.
6	건축사협회통보 및 홍보요청	2025.06.26.
7	응모신청 등록	2025.06.27. ~ 07.03.	최소 7일
8	질의기간	2025.07.03. ~ 07.06.	질의회신: 07.07.
9	설계공모 용역기간	2025.07.07. ~ 08.20.	45일
10	설계공모 작품제출	2025.08.20. ~18:00까지	제천교육지원청도착분
11	심사자료 배포	2025.08.22.
12	작품사전검토	2025.08.22.~ 심사전
13	설계공모 심사위원회 개최	2025.08.26.
14	입상작 발표	2025.08.29.
15	설계용역 계약	2025.09.08.
16	설계용역 기간	2025.09.08. ~ 2026.02.14.	160일간
17	공사발주	2026.02.20.
18	공사입찰 및 계약	2026.02.21.~ 03.16.
19	계약	2026.03.18.
20	공사기간	2026.03.23. ~ 2027.02.15.	330일간
21	준공(시운전 등)	2027.01. ~ 2027.02.
22	학교측 이사	2027.02.월 중