	2024년도
	용역코드 :
	인 가 :
	용역명 : 호남선 목포역 시설개선 사업 설계용역
			설 계 서
	(회 계)
	예산관리센터)
	약정항목)
	세금구분)
	세세사업)

	목 차
	1. 설 계 설 명 서 ………………………………… 2. 과 업 내 용 서 ………………………………… 3. 예 정 공 정 표 ………………………………… 4. 설 계 예 산 내 역 서 ………………………………… 5. 용 종 별 예 산 조 서 …………………………………	001 006 131 132 133

1. 설  계  설  명  서

가. 용 역 명 : 호남선 목포역 시설개선 사업 설계용역

나. 목    적 : 노후 철도역사인 호남선 목포역의 시설개선 사업을 통하여 지역의 수요에 대응할 수 있는 역사를 마련하기 위함

다. 위    치 : 전라남도 목포시 호남동 1-1, 1-864

라. 세부 시설계획

1) 규    모

가) 사업면적 : 약 4,231.8㎡(±5% 범위내)

나) 주요시설 : 여객시설, 역무시설, 지원시설 등

2) 용    도 : 운수시설(철도역사)

마. 공사비(예정) : 34,505백만원(부가세포함)

- 제시된 추정공사비는 건축, 토목, 기계설비, 소방(기계, 전기), 전기, 통신,  신호, 네트워크, 조경, 광장 및 주차장부지 조성비용, 야간할증, 계측기, 기존설비 이설(종합제어반 등), 승강장, 폐기물 처리, 철거 등에 대한 총공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함하여야 한다.(단, 추후 발주기관의 사정에 따라 공사비 내용이 변경될 수 있음)

- 총사업비 조정 협의 시 관련 자료를 검토 및 작성하여야 한다.

- 공사비 검토 결과 예산초과 시 설계안의 형태를 크게 변형하지 않는 범위 안에서 규모 축소 등을 고려하여야 한다.

- 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.(용역계약일반조건 등 참조)

바. 용역기간 : 착수지정일로부터 15개월

- 과업의 수행기간은 착수지정일로부터 12개월(인허가를 포함하여 12개월 내 설계완료)이며, 이후 3개월은 실시설계 완료 후 발주기관의 사업비 조정 및 확정을 위한 행정기간으로 조기 준공이 가능하다.

※ 계획설계 2개월 / 중간설계 4개월 / 실시설계 6개월 / 행정기간 3개월

- 각종인증 취득, 인허가 지연, 사업계획 변경 등 일정 조정이 불가피한 경우 협의를 통해 계약기간연장이 가능하며, 이 경우 설계비 증액은 없다.

사. 용역개요

구 분	단 위	수 량	비 고
1. 건축공사 설계	㎡	4,231.8	설계용역 12개월, 행정기간 3개월
2. 전력공사 설계	식	1	설계용역 12개월, 행정기간 3개월
3. 통신공사 설계	식	1	설계용역 12개월, 행정기간 3개월
4. 소방공사 설계	식	1	설계용역 12개월, 행정기간 3개월
5. 손해배상공제료	식	1	보증기간은 공사 준공까지 산정

아. 과업의 범위

본 과업은 건축, 구조보강, 기계, 토목, 조경, 전력, 통신(역무자동화설비, 열차행선안내설비 및 음성유도기 설비 포함), 신호, 소방 등 모든 공정에 대한 기본 및 실시설계로써 사업에 필요한 각종 인·허가(건축협의, 도시계획시설사업 실시계획 인가 등 포함), 현황측량 및 관계부서, 관계기관의 사전협의에 필요한 서류작성 및 제출, 사업내용 변경에 따른 시설 면적승인 및 시설비 변경 협의에 필요한 모든 업무를 포함한다.

※ 성과물은 제반 인허가 및 심의, 인증을 득한 성과물이어야 하며,「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」별표2 상급으로 작성해야 함.

1) 발주기관 내 사업추진 및 각종 위원회 자문·심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원해야 함.

2) 설계공모 심사위원 지적사항이 설계에 반영될 수 있도록 하며, 지적사항에 대해 설계단계별로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수 시에 보고하고, 설계단계에서 설계도서 납품 시 조치결과 보고서를 필히 첨부해야 함.

3) 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」제4조에 따라 공사기간을 산정하고 그 산정근거를 명시해야 함.(공사 주변현황 및 계획안에 맞는 공사예정공정표(안) 및 심의자료를 작성(「근로기준법」및 국토교통부 고시 검토 적용)

4) 건축물 인증 및 에너지 효율등급 인증제도 등 각종 인증 제도를 검토하여 필요시 의무등급·의무비율 이상을 획득하도록 설계하고, 그 인증을 득하여야 함.(수수료는 용역비에 포함되며, 추후 정산한다.)

※ 건축물 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경 인증(우수등급 이상), 에너지절약계획서 등

5) 신·재생에너지 설치의무화 제도에 따라 공급의무비율 이상의 기준을 맞추도록 설계해야 함.

6) 발주기관에서 시행한 지반조사, 측량 결과를 참고하여 설계하되, 필요시 추가로 과업을 수행할 수 있으며, 이때 발주기관과 사전협의를 거쳐 시행하고 비용은 설계변경을 통해 실비 정산한다.

7)「산업안전보건법」제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치)에 따른 설계안전보건대장 및  「건설기술 진흥법 시행령」제75조의2(설계의 안전성 검토)에 따른 설계안전검토보고서 등을 작성하고 제출해야 함.

※ 실시설계 완수(행정기간 3개월 제외) 최소 60일전 건설기술진흥법에 의한 ‘설계안전성평가’가 가능하도록 국토안전관리원에 제출서류를 완비 등 조치할 것(검토 수수료는 용역비에 포함하며, 추후 정산한다.)

8) 실시설계 단계에서 조달청 설계적정성 검토를 시행하는 경우 제출서류를 완비 등 조치해야 함. 이 경우 설계의 경제성 등 검토(VE)도 병행 시행할 수 있다.(검토 수수료는 용역비에 포함하며, 추후 정산한다.)

9) 설계의 경제성 등 검토(VE) 설계자료 제출 및 협조해야 함.

10) 기타 기술(설계) 용역을 수행에 필요한 보고서 작성, 발표자료 작성 및 조치사항 설계도서 반영

11) 수급인은 용역 준공 전 「철도안전법 시행령」제46조(철도보호지구에서의 행위 신고절차)에 따라 철도보호지구에서의 행위신고 관련 자료를 제출 및 협조해야 함.

12) 인․허가 업무(도시계획시설사업 실시계획 인가 등 포함)

- 본 용역의 시행에 필요한 인․허가는 수급인이 대행해야 함.

- 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 지자체를 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출해야 함.

- 건축, 경관심의 등 각종 위원회 자문·심의 등 인·허가를 득하기 위한 제반 협의, 승인 및 심의도서 작성·제출해야 함.

- 본 과업의 사전재해영향성평가, 교통영향평가, 지하안전영향평가 등 각종 영향평가, 도시계획시설결정(변경) 등이 필요할 경우 설계변경(추가 과업, 대가지급) 또는 발주기관에서 별도 용역 시행에 대하여 협의하여 추진하고 자료 작성, 서류 보완 등 업무에 적극 협조하여야 함.

- 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 인․허가, 조달청 공사계약(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 함.

- 수급인은 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성, 인장날인 및 세움터 개설 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 함.

13) 공사시공 시 필요한 일체의 용역설계를 그 범위로 하되, 이에 수반되는 조사 및 각종 협의․심의에 필요한 도면과 구비서류 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출자료와 기타 감독관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 이행하여야 함.

14) 「건설기술진흥법」제50조(건설기술용역 및 시공 평가 등) 및 「건설기술용역 및 시공평가지침」에 따라 시행되는 평가의 자료 제출 등 업무를 수행하여야 함.

15) 철도안전관리체계 변경승인에 대한 자료 작성 시 적극 협조하여야 함.

16) 수급인은 향후 준공통보(사용승인 신청) 시 신청서 및 준공도서 작성, 인장날인 등 업무를 수행하여야 함

2. 과  업  내  용  서

Ⅰ. 총 칙

1. 일반사항

1.1. 계약문서

가. 계약문서는 계약서, 유의서, (계약예규)용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 본 설계서(과업내용서) 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 이 경우 산출내역서는 그 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서로서의 효력을 갖는다.

나. 위 조건에서 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서등은 계약문서로서의 효력을 가진다.

1.2. 수급인의 의무와 책임

가. 수급인은 관계법령(건축사법, 건설기술진흥법 등) 및 본 용역계약서에서 정한 바에 따라 성실하고 정당하게 과업을 수행하여야 한다.

나. 수급인은 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

다. 설계용역 준공 후 설계도서에 대한 하자(현장 조건과의 상이, 설계의 오류 등)가 발견되어 발주기관의 시정요구가 있는 경우 즉시 수급인 부담으로 조치하여야 하며. 건설기술진흥법, 건설산업기본법에 의해 불이익을 받을 수 있다.

라. 수급인은 한국철도공사 제 규정, 하도급관계법령(건설기술용역 하도급 관리지침 등), 용역계약조건 등에 의하여 공정한 하도급이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

마. 발주기관은 수급인 및 용역관련자들의 과업 수행내용을 확인하기 위하여 사무소 등의 장소에 방문하여 그 내용을 점검할 수 있다.

바. 본 과업 수행상 외부 관련부서와의 협의 사항은 성실히 수행하여야 하며, 관련부서의 협의가 충분히 이루어지지 않아 발생되는 제반 문제는 본 용역이 준공된 이후라도 수급인이 보완하여야 한다.

사. 수급인은 과업을 수행하며 제출한 모든 성과물에 대하여 합리적이고 타당한 작성근거를 가지고 있어야 하며, 발주기관이 요구 시 즉시 제출하여야 한다.

아. 수급인은 설계상의 시공지침(과업지시서)을 명시하여 시공 시 시공방법을 분명히 숙지하고 시행 할 수 있도록 한다.

자. 관련기관과의 협의사항이 있을 경우 사전에 발주기관과 협의를 거쳐야 한다.

차. 관련부서 협의에 필요한 설계도서는 협의 일정에 맞도록 제출하여야 한다.

카. 수급인은 본 과업 수행 중에 예기치 못한 사고나 상황이 발생하였을 때는 지체없이 발주기관에 보고하여야 한다.

타. 수급인은 용역을 수행하면서 계획, 중간, 실시설계의 진행 정도에 따라 기성금을 신청할 수 있다.

1.3. 수급인의 윤리경영 이행사항

수급인(이하 ‘수급인’이라 한다)는 과업수행 시 다음 사항이 발생하지 않도록 하여야 한다.

가. 금전, 선물 등을 제공하는 행위(단, 불특정 다수인에게 제공하는 기념품, 홍보용 물품은 제외)

나. 한국철도공사(이하 ‘발주기관’이라 한다) 직원에게 개인적인 용무, 식사, 교통, 숙박 등의 편의를 제공하는 행위(단, 직무와 관련된 공식적인 행사에 주최자가 일률적으로 제공하는 식사, 교통, 숙박 또는 음식물은 제외)

다. 경조사 및 축․조의금을 제공하는 행위

라. 국내․외 출장 시 발주기관의 직원에게 여비를 제공하거나 관광 등의 수혜를 주는 행위

마. 발주기관의 직원에게 사적인 거래(부채상환, 보증수수, 동산, 부동산 차용)를 제공하는 행위

바. 발주기관의 소유의 동산, 부동산, 업무용 차량, 각종 공용으로 제공되는 물품 등을 정당한 행정절차 없이 사용 또는 허가를 요구하는 행위

1.4. 설계의 책임 및 손해배상

가. 수급인은 12개월 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 (계약예규) 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 따라 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

나. 수급인은 건축․토목․기계․전기․통신․조경․소방설계 등 모든 설계를 함에 있어서 각 분야별 설계서 및 조사․분석자료가 상호 부합되는지를 사전에 완벽하게 검토한 후 납품하여야 하며, 만일 검토 불충분으로 인하여 설계상 문제가 발생하였을 경우에는 이로 인한 모든 책임을 부담하여야 한다.

다. 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 재설계 및 보완설계를 하여 즉시 납품하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

라. 수급인은 용역 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제53조

2) 용역계약일반조건 제10조

3) 엔지니어링산업진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

4) 건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

5) 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시 제2019-997호)

6) 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

마. 설계자는 “건축서비스산업진흥법” 제22조에 따라 ‘설계의도 구현“을 위한 별도의 용역계약을 하고 설계도서 해석 및 자문, 자재 및 장비의 선정 검토, 시공상세도 및 디자인 검토, 건축물대장 및 현황도 등록 등의 업무를 수행하여야 한다.

※ 설계용역 준공 후 공사 중 설계도서와 해석이 다를 경우 등 설계자의 자문이 필요할 경우 설계의도 등에 대하여 설명하여야 한다.

바. 대상 용역이 종합심사낙찰제(또는 종합심사평가제) 대상 공사일 경우 물량내역 수정 허용공종 선정 및 물량산출 적정성 검토 등의 업무에 협조하여야 한다.

1.5. 과업의 변경

다음 각 호의 증감이 발생하는 경우에는 설계변경 사항으로 한다.

가. 용역과업 수행 중 계획변경으로 인하여 과업내용의 변경된 사항에 대하여 발주기관 지시가 있을 경우

1) 법령 등 지자체 등의 조례, 규칙, 기준 등에 의한 각종 심의결과에 대한 수정·보완을 위하여 불가피 하다고 발주기관이 인정하는 경우

2) 발주기관의 설계도서 검토결과 관계법령 등의 위반, 설계모순 등에 대해 건물 성능의 확보를 위해 불가피 하다고 발주기관이 인정하는 경우

3) 발주기관은 필요시 건물의 효율적인 사용 등을 위하여 사업면적 규모 등을 변경할 수 있다.

나. 천재지변 등 불가항력 사태에 의하여 과업수행이 불가능할 경우

다. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 공사계약일반조건 등에 의한 설계변경

라. 본 과업이외에 별도규모의 설계과업이 추가될 경우에는 해당분야에 한하여 예산의 허용범위 내에서 별도 용역비를 지급할 수 있다.

1.6. 책임기술자 등의 교체

가. 발주기관은 사업책임기술자 또는 분야별 책임기술자 및 과업에 참여하고 있는 기술자가 용역수행에 불성실하고 부적당하다고 인정되는 경우 수급인에게 교체를 명할 수 있으며, 수급인은 성실히 응하여야 한다.

나. 수급인은 참여기술자를 교체하고자 하는 경우 그 사유 등을 발주기관에 통보 한 후 사전에 승인을 받아 교체하여야 한다.

1.7. 계약의 해지

가. 수급인이 1.2. 가항의 규정에 위반하여 성실하고 정당하게 그 임무를 완수하지 못할 경우는 관련법(한국철도공사의 규정, 계약서 포함)에 따라 제재 및 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

나. 과업 수행 중 수급인의 귀책사유로 ｢중대재해 처벌 등에 관한 법률｣에 정한 “중대산업재해” 및 “중대시민재해”가 발생한 경우 해당 계약을 해지할 수 있다. 이때, 업무 진행 정도에 따라 용역비는 정산한다.

다. 열차운행협의가 필요한 경우 현장조사 전 열차운행협의를 하고 협의 전에 작업현장 투입을 금지하여야 하며, 열차운행상황에 맞는 특별교육 시행여부를 확인하고 발주기관 협의 없이 무단 작업 시 용역 중지 및 계약해지 할 수 있다.

라. 설계공모 실격처리 대상에 해당하는 경우 체결된 계약을 무효(선금 및 기성금 회수)로 하고 관련 법령에서 정한 사업 지연에 따른 민·형사상의 책임을 진다. 수상자의 경우에는 입상 무효, 상금을 회수하며 경우에 따라 민·형사상의 책임을 진다.

마. 발주기관은 다음과 같은 조건일 때 계약을 일방적으로 해지할 수 있으며, 이에 대하여 수급인은 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

1) 설계 이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 부득이한 사유로 사업계획을 중단할 때

4) 기타 계약조건을 위반할 때

바. 수급인의 계약 불이행으로 계약을 해제 또는 해지하는 경우 계약보증금은 귀속한다.(계약업무처리 시행세칙 제58조4항)

2. 과업수행 지침

2.1. 과업의 적용 범위

본 과업내용서는 호남선 목포역 시설개선 사업 설계 과업에 적용하며 수급인은 본 과업내용서와 관계 법령, 규정, 지침 및 각종 한국철도공사 제 기준에 따라 제반사항을 성실히 수행하여야 한다.

2.2. 관련법규 및 기준

가. 한국철도공사, 철도건축물 설계기준 및 관련규정

1) 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률, 철도안전법, 철도건설규칙, 도시철도법, 도시철도건설규칙

2) 철도설계지침 및 편람, 철도설계기준, 철도건설공사 전문시방서, 한국철도표준규격 등

3) 계약업무처리 시행세칙, 공사 및 용역관리 규정, 디자인경영 운영 규정, 한국철도공사 철도사인류 설치기준 매뉴얼 등

4) 철도안전관리 시행세칙,  열차운행선로 지장작업 업무 세칙, 열차운행선 인접공사 안전관리 매뉴얼, 전기철도안전관리자 운영요령 등

나. 국토교통부 제정 각종 공사 표준시방서(건축공사전문시방서 등) 및 설계기준

다. 관련 법령 및 규정

1) 국토의 계획 및 이용에 관한 법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법

2) 건축법, 건축사법, 공공 발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준, 표준설계도서의 운영에 관한 규칙

3) 건축구조기준, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 극한강도설계법에 의한 철근콘크리트 구조기준, 지진ㆍ화산재해대책법

4) 교통약자의 이동편의 증진법, 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 영유아보육법, 공중화장실 등에 관한 법률

5) 실내공기질 관리법, 하수도법, 승강기 안전관리법, 기계설비법, 환경영향평가법, 수도법, 소음·진동관리법, 도시교통정비촉진법, 대기환경보전법, 수질환경보전법, 폐기물관리법, 환경․교통․재해등에관한영향평가법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 도로법, 주차장법, 사도법, 하천법, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률, 지적측량 시행규칙, 사방사업법, 농지법, 산지관리법, 환경정책기본법 등

6) 건설기술진흥법, 건축서비스산업 진흥법, 엔지니어링기술 진흥법, 산업안전보건법

7) 도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙, 도시계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙, 도로표지규칙

8) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙, 건축물의 에너지절약설계기준

9) 녹색건축물 조성 지원법, 녹색건축 인증에 관한 규칙, 건축물 에너지효율등급인증 및 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙, 건축물 에너지절약설계기준, 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법, 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정, 에너지이용 합리화법 등

10) 소방기본법, 소방시설공사업법, 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

11) 전기통신기본법, 전파법, 정보통신공사업법, 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정, 집적정보통신시설보호지침, 구내통신설비기준 등

12) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준, 대한전기협회 발행 내선규정, 배전규정, 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 한국전력공사 전기공급약관 등

13) 보안업무규정, 기계설비 기술기준 등

라. 지방자치단체 조례

마. 기타, 본 사업에 필요한 한국산업규격, 기타 안전, 교통, 환경 등에 관한 법령 및 규정

바. 법령 등을 적용함에 있어서 본 과업의 품질 확보 상 유리한 기준을 우선 적용한다.

사. 각종 법령과 본 과업내용서의 내용이 상충 또는 해석상의 차이가 발생할 시 발주기관과 사전협의 후 설계에 반영하여야 한다.

2.3. 지침 변경 등

1) 본 설계서의 내용 중 사업의 내용 및 설계 지침은 발주기관의 사정에 의하여 변경될 수 있다. 용역의 범위가 변경되는 경우 수급인과 발주기관의 협의에 의하여 계약내용을 조정한다.

2) 수급인은 본 설계지침서의 내용 중에서 법령 등에 위배 상충되거나 기술적으로 문제가 있다고 판단되는 경우에는 수정·보완할 수 있다.

3) 본 설계서 및 기타사항에 대하여 발주기관과 수급인의 의견이 다른 경우 협의로 정한다.

2.4. 조사 및 분석, 기타 고려사항

가. 현황조사 및 사업계획 검토

수급인은 과업대상 부지에 대한 현황조사 및 사업계획 내용을 구체화 하여 다각적인 검토가 이루어져야 한다.

1) 현황조사 및 사업계획 검토

가) 대상부지의 지적, 대지경계, 도시계획, 국토개발계획, 기타 관련 지자체 개발사업 등의 현황 및 계획

나) 대상부지 내 기존 시설물과 지하 매설물 등 지장시설물의 현황 및 계획

다) 대상부지와 주변지역에 대한 도로, 하천 현황 및 계획

라) 에너지공급시설(전기, 가스, 지역난방 등)과 기반시설(광통신망, 광케이블, 교환기 등 통신설비의 구성 및 이중화)의 현황 및 계획

마) 급수시설, 배수시설, 오수처리시설의 현황 및 계획

바) 민원 등 건설에 영향을 미칠 수 있는 인근지역의 시설물 현황 및 영향

사) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

2) 수급인은 설계에 필요한 자료를 조사, 수집하여 검토한 후 발주기관과 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

3) 발주기관이 제공하는 자료 외에 용역수행을 위해 필요한 자료는 수급인이 확보하여야 한다.

나. 기타 고려사항

수급인은 해당 시설물을 설계할 시 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1) 해당 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며 장비 등의 유지관리 방법을 제시한다.

2) 굴착이 필요한 경우는 지하매설물의 안전관리에 관한 사항을 충분히 반영한다.

3) 우천, 혹서, 혹한 등으로 작업불능 일수와 휴일, 주52시간 근무 등을 고려하여 적절한 공사기간을 계산하여 정해야 한다.

4) 국산자재, 한국산업규격(KS), 한국철도표준규격(KRS), 한국철도공사표준규격(KRCS), 친환경 및 우량자재를 우선 사용하도록 반영한다.

5) 미관을 고려하여 환경친화적 설계가 될 수 있도록 노력한다.

6) 구조검토 등이 수반되는 공사는 필요시 설계 구조 전문업체에 용역설계 또는 전문가에게 자문한다.

3. 공정관리

3.1. 일반사항

수급인은 발주기관이 제공한 자료와 수급인이 조사 분석한 자료를 토대로 세부적인 공정을 검토하여 발주기관과 협의 후 설계를 진행하여야 한다.

3.2. 설계관리

가. 착수계 제출

1) 수급인은 계약일로부터 10일 이내에 착수계를 발주기관에 제출하여야 한다.

2) 착수계에는 용역착수계, 사업책임기술자 지정계, 예정공정표, 조직 및 기구표, 전체 참여기술자 현황 및 명단(분야, 성명, 구체적 업무내용, 기술등급, 자격종목, 참여기간, 생년월일 등), 각 공종별 참여기술자 서류(자격증 사본, 건설기술진흥법 등에 의한 경력증명서), 보안각서, 사업자등록증(원본대조필), 건축사업무신고필증(원본대조필), 건축사면허증(원본대조필), 재직증명서(발주기관 제공양식), 건설기술자 경력증명서(경력관리 수탁기관 발행분) 등을 발주기관의 규정에 따라 첨부하여야 한다.

3) 산출내역서를 발주기관에 제출하여야 한다.

나. 과업수행 계획서 제출

1) 수급인은 과업수행 계획서를 작성하여 발주기관에 제출하여야 한다.

2) 과업수행계획서에는 다음사항이 상세히 포함되도록 작성하여야 한다.

가) 현장조사, 품질경영, 설계 추진일정 및 총괄 공정표 등이 포함된 과업수행계획서를 승인받은 후 과업을 수행하여야 한다.

나) 건축계획, 구조, 토목, 기계설비, 조경, 전기, 통신, 소방 등 각 분야별로 작성하고, 관련 건물에 맞는 설계추진방향을 제시하여야 한다.

다) 과업수행 시 건축(구조, 기계설비, 소방설비, 부대토목, 조경 포함), 전기(조명설비, 배관배선 등), 통신 분야별로 지정된 감독자에게 분야별 과업내용에 제반사항을 별도 보고 및 제출하여야 한다.

라) 본 과업을 수행하기 위한 분야별 과업 수행팀을 건축(건축, 구조), 기계설비, 부대토목(조경 포함), 전기분야(조명설비, 배관배선 등), 통신분야, 소방분야(기계, 전기) 별도로 구성하며, 과업의 내용에 따라 단계별 과업기간을 세분한 과업수행계획서를 작성 제출하여 효과적인 과업수행이 될 수 있도록 한다.

마) 관계기관과의 협의사항, 협의일정 등을 포함한다.

바) 과업내용을 충실히 검토하여 항목별 세부 수행계획을 포함하여야 한다.

다. 공정표 작성 및 관리

1) 공정표는 착수계에 첨부된 공정표를 기준으로 계약조건과 연관 있게 분야별․단계별로 상세하게 작성하고, 단위 과업별 투입 비용, 기간 등이 나타날 수 있도록 작성하여야 한다.

2) 공정표는 건축계획, 구조, 기계설비, 소방설비, 부대토목, 조경, 전기, 통신 등 각 분야의 설계가 원활히 이루어 질 수 있도록 작성하여야 하며, 현장조사 및 자료수집, 관련부서 협의일정, 인․허가를 위한 관계기관의 협의일정 등도 포함되도록 작성하여야 한다.

3) 부진공정 만회대책

수급인은 계획진도율이 계획공정 대비 실적이 10%이상 지연될 경우 부진사유 및 공정만회 대책을 수립하여 보고하여야 한다.

라. 기록유지

수급인은 일일 작업일지를 작성하여 책임기술자가 서명한 후 보관유지 하여야 하며, 발주기관이 요구할 경우 제출하여야 한다.

마. 관련분야 설계협조 및 반영

토목, 전기, 통신 등 관련분야의 설계가 원활히 진행 되도록 필요한 자료를 해당 수급인에게 신속히 제공하여야 하며 관련 설계 내용을 파악하여 건물설계에 반영하여야 한다.

바. 업무보고 및 회의

≪수급인은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야한다≫

1) 업무보고

가) 주간공정보고

- 매주 목요일까지 협의 양식에 따라 담당 감독자에게 전자우편으로 제출한다.

나) 월간공정보고

- 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 협의 양식에 따라 담당 감독자에게 전자우편으로 제출한다.

다) 수시보고

- 설계용역 진행 중 문제점이 발생하여 별도의 협의 또는 지침이 필요하거나, 계약내용의 변경 사유가 발생할 것으로 판단되는 경우에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 담당 감독자에게 즉시 제출하여야 한다.

- 보고의 누락으로 인해 수급인의 불이익이 발생하더라도 수급인은 하등의 이의를 제기할 수 없다.

2) 업무회의(각 보고회 시 사업책임기술자 참석 필수)

가) 일반사항

- 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 사업 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

- 본 설계서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

- 본 설계서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

- 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

- 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

나) 착수회의

- 착수회의는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

- 착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

다) 자문위원회 : 수급인은 최소한 보고회 7일전까지 자문위원회 검토 자료를 작성하여야 한다. 발주기관에서는 자문위원회를 주관하며, 수급인은 참석하여 설계내용을 설명하여야 한다. 수급인은 자문위원회에서 나온 의견을 검토하여 결과보고서를 작성하여야 한다.

라) 계획설계 보고회 : 수급인은 계획설계(안) 완료 전 발주기관과 협의하여 계획설계 보고회 일정을 정하고, 최소한 보고회 7일전까지 관련 자료를 작성하여야 한다. 발주기관에서는 계획설계 보고회를 주관하며, 수급인은 참석하여 설계내용을 설명하여야 한다. 수급인은 계획설계 보고회에서 나온 의견을 검토하여 결과보고서를 작성하여야 한다.

마) 중간설계 보고회 : 수급인은 중간설계(안) 완료 전 발주기관과 협의하여 중간설계 보고회 일정을 정하고, 최소한 보고회 7일전까지 관련 자료를 작성하여야 한다. 발주기관에서는 중간설계 보고회를 주관하며, 수급인은 중간설계 보고회에서 나온 의견을 검토하여 결과보고서를 작성하여야 한다.

바) 실시설계 보고회 : 수급인은 실시설계(안) 완료 전 발주기관과 협의하여 실시설계 보고회 일정을 정하고, 최소한 보고회 7일전까지 관련 자료를 작성하여야 한다. 발주기관에서는 실시설계 보고회를 주관하며, 수급인은 실시설계 보고회에서 나온 의견을 검토하여 결과보고서를 작성하여야 한다.

사) 수시회의 : 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

아) 디자인 심의(한국철도공사 디자인센터)

- 건축물 내, 외부 디자인에 대하여 발주기관의 디자인 심의를 지자체 디자인 관련 심의 접수 전까지 받아야 하며 용역 준공 전에 완료(수정보완 포함)하여야 한다.

- 수급인은 심의내용에 대한 조치 계획 및 결과를 발주기관에 통보하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 그 심의 내용을 예산범위 내에서 설계에 반영하여야 한다.

- 디자인 심의 내용

· 건축물의 배치 및 형태

· 건축물 내‧외부 마감재의 디자인 및 색채

· 지역여건과 조화 및 상징성

· 구조, 조경 및 부대시설 계획의 적정성

· 원안(현상공모) 대비 변경사항에 대한 타당성과 현안사항(해당시)

- 디자인 심의와 관련된 사항은 관련 법령에서 정한 경우를 제외하고는 한국철도공사 ‘디자인경영 운영 규정’을 따른다.

자) 기타 회의

- 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

- 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다

- 업무보고 및 회의내용의 기록

차) 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익 일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

4. 관급자재의 선정

4.1. 공공기관은 중소기업청장이 지정·고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매하도록 한 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제11조(공사용 자재의 직접구매 증대 등)에 해당하는 “직접구매 대상품목”을 반영하고, 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」 제6조(공공기관의 녹색제품 구매의무)에 따라 우수한 녹색제품 자재를 반영하도록 한다.

4.2. 수급인은 상기 규정에 의거 해당되는 자재 LIST를 작성·제출하여야 하며, 관급자재 선정을 위하여 각 자재에 대한 비교·검토 결과를 발주기관에 보고하고 승인 후 관급자재를 선정한다.

4.3. 중소기업 생산 제품 중 여성기업생산제품, 장애인기업 생산제품, 중증장애인 생산제품, 기술개발 제품, 녹색인증 제품에 대하여 우선 사용을 검토 하고, 각 제품별 비교 검토서를 제출하여 발주기관과 협의하여 관급자재를 선정하여야 한다.

5. 보안관리 및 보안대책

5.1. 수급인은 본 용역설계의 설계도서․자료 등에 대한 보안관리를 철저히 하여야 하며, 다음과 같이 보안 대책을 수립․시행하여야 한다.

가. 용역회사 대표자는 보안서약서(별지 제38호서식)를 제출하고 용역참여자에 대한 보안서약서(별지 제39호서식)는 회사 대표자의 책임 하에 징구 제출하되 반드시 자필로 서명

나. 해당 용역에 대하여는 작업 장소(실)를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제

다. 자료 보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정·부책임자를 지정하여 관리

라. 중간 및 최종보고서 등 용역성과물(확정안 포함)은 납품물량 외 추가발행을 금지하며, 용역감독관과 협의하여 내용의 중요도에 따라 비밀 또는 대외비로 분류·관리

마. 대외비 이상의 자료는 열람기록전을 첨부하여 열람자의 범위를 파악하고 반드시 업무와 직접 관계가 있는 자에 한하여 열람

바. 용역의 정·부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때는 용역업무일지(별지 제40호서식)를 비치하여 작업내용을 기록 유지

사. 과업의 내용상 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 용역은 참여인원을 최소화 하되 정규직원에 한하여 업무를 수행

아. 용역 수행과정에서 위원회 등 회의자료에 본 과업의 내용이 포함된 경우에는 배부처를 감안하여 필요한 부수만을 생산하되, 회의 종료 후 회수하여 파기

자. 비밀 또는 대외비로 분류된 성과물을 발간하고자 할 때에는 정부비밀취급인가 업체를 이용

차. 용역참여자가 교체될 시는 인계인수를 철저히 하고 용역감독관의 확인을 받아야 하며, 보안서약서를 제1항 제1호에 준하여 제출

카. 그 밖에 용역의 특수성 등으로 인하여 용역과업 수행 상 보안관리를 요하는 사항은 용역발주 부서에서 보완 시

5.2. 비밀 또는 대외비로 분류되었거나 분류하여야 할 용역사업 등은 제1항에도 불구하고 보안담당관에게 보안 대책의 적정성 여부를 검토 의뢰하여야 한다.

5.3. 각 기관의 계약담당직원은 계약체결 전에 제1항의 보안대책이 과업지시서에 포함되어 있는지 여부를 검토하여야 하며, 대외비 이상으로 발주 요청된 용역성과물 등 유인물에 대하여는 비밀취급인가 특례를 받지 아니한 업체와 계약 체결할 경우, 계약 즉시 비밀취급인가 특례지정을 받은 후 사업을 시행할 수 있다.

5.4. 제1항에도 불구하고 단순ㆍ반복작업만을 수행하고, 그 내용이 유출될 경우 공사와 관련된 피해 및 사회적ㆍ국가적 물의를 발생시키지 않는 용역에 대해서는 보안성 검토를 생략할 수 있다. 단, 이때는 과업지시서에 제1항 각 호를 참고한 보안대책을 포함시켜야 한다.

5.5. 용역 관리담당직원은 용역착수 전 제1항제1호부터 제3호까지의 이행여부를 확인하여야 하며, 미 조치된 사항은 즉시 조치하여야 한다.

5.6. 용역 관리담당직원은 용역수행 시 보안대책의 이행여부를 월1회(정기보안진단의 날) 확인 점검하여야 하며 특히 사업의 위치선정, 노선 결정 등 주요 작업 시에는 자료관리 정·부책임자에게 작업장에서 발생하는 폐휴지 소각 및 각종 자료의 보관관리를 철저히 주지시키고 그 이행상태를 수시로 점검하여야 한다.

5.7. 용역 감독부서는 매분기 1회이상 용역업체에 대한 현지 보안관리 상태에 대한 지도점검을 실시하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

5.8. 용역 관리담당직원은 용역 종료 시에는 성과물, 각종 제공자료 및 저장매체를 전량 회수하고 PC내 용역관련 자료를 삭제하여야 한다.

6. 안전대책

가. 수급인은 인원 및 장비의 운영에 있어 불안전한 행동이나 조건이 존재하지 않도록 적절하게 관리와 통제를 하여 사고를 예방하여야 한다.

나. 본 사업과 관련한 유해로운 인적, 물적 또는 관념적인 제반사항에 대하여는 미리 보안책을 강구하여야 한다.

다. 본 용역시행과 관련하여 과업수행자의 안전 확보를 위해 발주기관의 지원이 필요한 사항에 대해서는 사전에 협조 요청할 수 있다.

라. 작업시행 중 불안전한 행위로 인한 모든 사고에 대하여는 수급인에게 그 책임이 있다.

마. 철도지역 내 측량 시 특고압선에 의한 감전우려가 있어 2.0m이상의 측량 스타프(함척) 사용금지(사람높이 이상으로 들지 않는다.)

바. 현장조사 시 수급인은 필요시 철도운행안전관리자 및 열차감시자를 배치할 수 있으며, 이때 비용은 정산한다.

7. 관련기관 협의 및 인․허가

가. 수급인은 관련기관 협의․심의 및 관련법에 의한 인․허가 등에 필요한 도서를 작성 제출하여야 하고, 관련기관 협의가 원활히 추진되도록 하여야 하며, 특히 관련법에 의한 인․허가를 득하여 공사를 원활히 착공할 수 있도록 적극 협조하여야 하며, 인․허가 협의 시 발주기관을 보조하여야 한다.

1) 수급인은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 건축법, 농지법, 산지관리법 등에 의한 건축허가(건축허가 시 의제 처리되는 사항 포함 등)를 받을 수 있는 도서와 기계설비공사에 대해 착공 전 확인을 받기 위한 도서를 작성 제출하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 수급인 부담으로 한다.

나. 수급인은 용역이 종료된 이후라도 인․허가 관련기관에서 자료의 수정․보완요구 등이 있을 경우에는 지체 없이 협조하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 수급인 부담으로 한다.

다. 수급인은 본 과업의 각종 심의 및 인·허가의 신청 및 취득에 관한 제반 업무를 검토 후 설계용역에 착수한다.

8. 설계안전성(DFS) 작성 및 검토

가. 계약상대자는 따라 설계안전성(위험성) 검토를 수행하여야 하며, 설계안전성검토보고서를 작성하여 제출해야 한다.

1) 설계과정 증에 도출한 건설안전 위험요소 및 위험성에 대한 평가를 실시한 결과로서 위험요소/위험성/저감대책 형태로 작성된 설계안전성검토보고서

2) 설계에서 잔존하여 시공단계에서 반드시 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항

나. 위험성검토 대상선정은 위험수준, 피해강도를 고려하여 선정하고 위험성 검토 세부 공종별로 분류하여 위험성 검토 결과를 설계에 반영하여야 한다.

다. 계약상대자는 위험성 저감대책을 수립하여야 한다.

1) 위험성 검토 공종별 설계체크리스트 작성

2) 구조검토 및 보강공법 반영

3) 안전시공방법

4) 계측계획반영

가) 지하수위계, 지중변위계, 어스앵커변위계, 하중계, 변위계, 침하계, 경사계 등

나) 단계별 계측계획

다) 위험수준별 계측 관리기준 설정

라. 계약상대자는 위험개소에 대하여 설계성과품을 작성하여야 한다.

1) 구조물도, 가시설도, 시공순서도 등 상세도면

2) 위험공종에 대한 특별시방서

마. 계약상대자는 위험개소의 시공 중 관리방법에 대하여 검토하여야 한다.

사. 계약상대자는 설계진행율 80% 수준에서 안전성 검증을 의뢰하여야 한다.

9. 설계 안전보건계획 수립

가. 설계 시 안전보건을 고려한 공사기간·금액 산정을 위해 관련 규정(기준) 적용에 철저를 기해야 한다.[위험도, 주말 및 공휴일 작업, 야간작업, 2인1조(밀폐, 중장비 등), 기상이변(강풍, 폭염, 미세먼지 등)]

나. 설계 안전성 검토(DFS:Design For Safety)를 위한 유해위험요인 확인·평가 및 위험성 감소대책을 수립하여야 한다.

Ⅱ. 일반적 설계지침

1. 공통사항

1.1. 일반사항

가. 공모안을 최대한 준수하되, 공모안의 수정사항에 대하여 발주기관의 요구 시에는 적극 반영할 수 있도록 검토하여야 한다. 특히, 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 수급인 임의로 판단해서는 아니되며, “발주기관”측의 확인을 받아야 한다. 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 수급인은 설계착수 전 설계도서 등에 대하여 완전하게 숙지하여 설계에 반영하고, 개념 설계의 내용을 숙지하여 설계에 반영하여야 한다. 각 분야별 설계는 관련 법령에 의한 제반 규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 설계자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사 시 도로의 연결관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 가스관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

라. 설계업무는 관계법규, 지방자치법규, KS 규격, 공공기관의 기준 및 각종 관련 서적에 따라 설계하고, 설계도서 작성 시 표현되는 도시기호, 용어, 심벌 등은 한국산업규격에 따르고 특이한 표현 등은 반드시 범례 또는 주기 등으로 표기한다.

마. 설계에 적용하는 자재는 한국산업규격(KS) 표시 인증 제품을 원칙으로 하고, 한국산업규격(KS) 표시 인증 제품이 없을 경우에는 동등이상의 자재나, 공산품 품질관리 기준에 적합한 상품을 사용하되 특정회사나 특정제품이 설계도서에 표시 또는 표현되어서는 안 된다.

바. 설계도서는 공사발주가 용이하도록 발주기관과 협의하여 작성한다.

1) 설계도면은 각종 상세도면을 충분히 작성하여 시공이 용이하도록 하여야 한다.

2) 공사시방서는 설계도면에 명시되지 아니한 시공방법, 품질관리기준 등 시공 관련 사항 등을 작성하여야 한다.

3) 설계도면 및 시방서에 특정제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 “발주기관”의 승인을 받아야 한다.

4) 신개발 공법이나 자재 등을 개발하여 설계 반영 시에는 비교 검토 보고서가 있어야 한다.

3) 설계도서 작성 시 설계도서 작성기준 내용을 반영하도록 하며 단계별 설계도서 작성은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」(국토교통부 고시) 별표2에 따른다.

사. 수급인은 발주기관이 제시하는 자료에 대하여 사실 확인을 하여야 하며 상이점이 발견될 때에는 발주기관에게 그 내용에 대한 확인을 요청하여야 한다.

아. 타 분야와의 인터페이스 사항은 관련분야와 협의하여 설계의 중복 및 누락이 발생하지 않도록 하여야 한다.

1) 수급인은 건축설계 시 타 분야(소방, 토목, 전기, 통신 등)에서 설계를 수행하는 시설이나 간섭사항 등은 필히 시공이 가능하도록 상호 협의하여 설계에 반영되어야 하며 타 분야 발주 설계의 협의 통합․조정이 필요한 경우에는 발주기관에게 조정 요구하여야 한다.

2) 본 과업과 관련 분야와 긴밀히 협조하여 설계하여야 하며 특히 토목구조물 및 기존구조물에 영향을 주는 부분에 대하여는 발주기관과 협의하여 설계한다.

자. 발주기관의 토목, 전기, 통신, 소방 등 관련분야의 설계내용 및 주변에서 진행되고 있는 관련기관 사업의 환경․교통영향평가 결과를 파악하여 변경 또는 개선이 필요한 사항이 있을 경우에는 관련분야(관련기관)에 반영이 되도록 발주기관과 우선 협의한다.

차. 운행선과의 간섭 또는 근접하여 설계를 하는 경우 지장물 및 기존시설물 등을 검토하여 필요시 승객 및 열차의 안전 등이 고려된 시공 가능한 설계를 하여야 한다.

카. 수급인은 성과물 제출 전 설계점검용 체크리스트를 작성하여 발주기관과 협의하고, 성과물 제출 시 체크리스트에 의한 점검결과를 제출하여야 한다.

타. 기타 발주기관이 지시하는 사항에 대하여 기록을 유지하고 관련된 부분은 설계에 반영하여야 하며, 기타 관련 규정 및 지침이 개정될 경우 최신기준을 적용하여 향후 운영상의 문제가 없도록 설계에 반영하여야 한다.

파. 기타 발주기관의 요구사항을 반영한다.

1.2. 기본 원칙

가. 설계는 보편타당한 것이어야 하며, 경제성, 시공성, 유지관리성을 고려하여 최적안을 제시하여야 한다.

나. 사용 자재는 품질 성능이 공인된 것으로서 공급이 안정적이고, 사후 보수용 자재의 확보에 어려움이 없어야 한다.

다. 주요 자재는 투자비·내용연수·유지관리비 등을 비교·분석하여 투자 효과가 우수한 것을 선정하여야 한다.

라. 건축을 위해 필요한 관련 법, 규정, 제도를 반영하여 설계하여야 하며, 상기 언급된 법, 규정 등을 검토하여 설계에 반영해야 한다.

마. 건물 또는 시설물의 안전에 관계되는 사항은 조건 또는 변경 등의 가능성을 고려하여 안전율을 두어야 한다.

바. 교통약자의 이동편의 증진법 및 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 저촉되지 않도록 설계하여야 한다.

사. 에너지 절약을 위하여 고효율 구조물이 되도록 설계에 반영하여야 한다.

1) 설계 시에 부지의 환경조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

2) 에너지이용합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무), 산업통상자원부 고시 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 및 산업통상자원부 고시 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정에 의하여 고효율 에너지 기자재를 사용하여야 한다.

3) 건물자체가 에너지절약적인 건물이 되도록 평면계획(실의배치 등), 입면계획(적정창 면적비 등), 단면계획(최적 층고계획 등)을 하여야 한다.

아. 설계는 환경친화형(Green Building System) 건축 설계를 적용하고, 건축물의 에너지절약과 쾌적성 향상을 위하여 각종 환경조절(제어)시스템과 설비시스템이 최적화 되도록 한다.

1) 수자원의 효율적 활용과 수해방지 등을 위하여 빗물 저류조 또는 빗물이용시설 설치 등을 적극 검토한다.

2) 주변 자연환경과의 조화로운 조형성과 자연환기 및 빛을 최대한 고려해야 한다.

자. 역별, 역간별, 개소별, 설비별, 단계별계획에 따라 신설과 철거를 구분하여 사업비를 산출하여야 한다. 특히, 사업비 산출시 기존선 개량에 따른 단계별 시공계획을 면밀히 검토하여 사업비가 누락되지 않도록 하여야 한다.

차. 대상지의 내·외부 공간계획 시 범죄예방환경설계(CPTED설계)를 고려하여야 한다.

1) 자연적 감시가 용이한 외부 공간을 조성하고 수목이나 시설물에 의한 사각지대가 생기지 않도록 유의하여야 한다.

2) 인적이 드문 곳이나 사각지대 우려개소에는 CCTV를 적절하게 배치하여 범죄예방이 되도록 하여야 한다.

3) 남·여 화장실 칸막이는 바닥에서 천장까지 빈 공간 없이 설계하여 불법촬영을 예방하고, 이에 따른 환기 및 조명시설을 계획하여야 한다.

* CPTED(Crime Prevention through Environmental Design) : 환경설계를 통한 범죄예방 건축설계기법

Ⅲ. 분야별 과업내용

1. 건축분야

1.1. 일반사항

가. 사업시행 부지의 도시계획 및 관련 법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규, 지구단위계획 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인, 설계에 반영한다.

나. 사업시행 부지의 입지조건, 지질, 교통, 전력, 용수, 공해 등의 현지상황을 사전 조사하여 대지의 특성 및 환경에 순응하면서 친환경적인 에너지 절약형 시설로 설계에 반영한다.

다. 지반조사, 측량 및 조경계획을 고려하여 설계하여야 한다.

라. 공간, 시선, 거리감 등의 건축적 요소에 이용자는 물론이고 지역주민이 친근감을 느낄 수 있는 지역과 상생하는 건축물로 인식 가능하도록 설계에 반영한다.

마. 건축과 실내디자인, 관리운영계획이 상호작용 가능하고 연계성을 갖춰 효과적으로 운영될 수 있도록 설계해야 한다.

바. 고효율 기자재 사용, 창호계획 등 건축 계획시 에너지 절감이 가능한 건축적 기법을 반영하고 시설 노후화 및 기술 진보 등으로 인하여 발생되는 기계, 전기, 통신, 마감, 유지관리가 용이하도록 설계에 반영한다.

사. 설계도서는 관계법령에 의한 인ᆞ허가 취득에 문제가 없도록 지구단위계획 및 관련법규와 관할 지자체 등의 조례, 규정, 자치법규 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인하여 설계에 반영하여야 한다.

아. 화재, 보안, 피난 및 구조안전 등 재해방지를 위한 건물로 설계하고, 테러 등의 재난에 대비한 보안계획을 강구하여야 한다.

자. 옥외와 연결된 모든 출입구는 폭우 시 우수 유입을 방지할 수 있도록 입구 전면에 적정한 경사 및 차수판을 설치하는 등 충분한 배수설비를 갖춰야 한다.

차. 시공안전성 및 효율성 확보, 인접 시설물에 대한 영향을 최소화할 수 있도록 가설계획을 수립하여 설계에 반영한다.

카. 본 사업으로 인하여 발생되는 모든 지상 및 지상 매설 혹은 존치물의 이설·철거·증설 등에 대해 현장조사 및 관계기관과 사전 협의하여 합법적으로 제반사항을 이해하여야 한다.

타. 다중이 이용하는 시설이므로 재해 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 설계하여야 한다.

파. 건축분야는 토목, 기계, 전기, 소방, 통신, 조경 등 타 분야와 긴밀히 협조하여 기능 발휘에 적합하고 상호 연관성 및 효율성이 보장되어야 하며, 설계, 시공 및 유지관리상의 각종 자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

하. 향후 공간 활용 및 재배치를 고려하여 가변성 및 융통성을 확보하여 설계하여야 한다.

1.2. 주요 고려사항

가. 역사의 형태, 재료, 색상 등은 주변환경과 조화롭게 계획한다.

나. 역사를 신축하는 경우 지역특성, 지명유래, 특산물 등 주변지역 여건을 충분히 반영한 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

다. 각종 재난에 대피가 용이하도록 계획하여 안전한 건물이 될 수 있도록 한다.

라. 장래 사업의 변경, 확장에 대비한 설계가 되도록 하여야 한다. 특히 역사 설계의 경우 역세권 개발을 감안, 역사 및 역세권 전체가 조화를 이룰 수 있도록 고려하여야 한다. 다만, 구체적인 역사 주변 개발계획(사업범위, 사업시기, 사업주체 등)이 확정되지 않았을 경우에는 개발계획과 관련된 시설에 대해서는 설계에 반영하지 않는 것을 원칙으로 하며, 부득이한 사유가 있는 경우 관련근거를 명시하여 반영할 수 있다.

마. 이용수요가 많은 대도시권 주요 거점역사(고속철도역, 시․종착역, 관광지역 등)에는 여건 변화 시 장래 증축(부지 및 증축 평면 등) 사전계획을 수립하고 설계에 반영하여야 한다.

바. 지역의 기후, 풍토, 특성 등을 고려한 건물이 되도록 하여야 한다.

사. 건물은 각 기능이 원활히 조화를 이룰 수 있도록 기능에 중점을 두고 계획하되 창의력이 있는 작품이 되도록 하여야 한다.

아. 유지보수 및 관리의 문제점을 고려하며, 역사 외부가 커튼월 구조일 경우 외벽 하부는 파손방지 및 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

자. 건물은 열차의 소음, 진동에 대한 대책을 수립하여야 하며, 건축한계 및 차량한계를 고려하여 열차운전에 지장이 없도록 하여야 하며, 설계 시 기존 규정․표준을 준수하고 화재피해, 침수피해의 방지에 특히 유의하여야 한다.

차. 철도역사는 장애물 없는 생활환경(BF)인증 제도 시행지침에서 정하고 있는 ‘우수등급’에 준하도록 설계가 되도록 하여야 한다. 다만, 지하역사의 구조물 여건상 불가피한 경우는 예외로 할 수 있다.

※ 장애물 없는 생활환경(BF)인증을 득할 예정인 철도역사는 설계 시 인터페이스 협의를 통하여 토목, 전기, 통신 등 관련분야 설계에 반영될 수 있도록 하여야 하며, 시공 중 관련사항에 대한 시행여부를 확인하여야 함을 설계도서에 명기하여야 한다.

카. 철도건축물은 현장여건, 경제성 및 시공성 향상 등을 위하여 신기술․신공법을 검토․반영하여야 한다.

타. 철도건축물 및 홈지붕은 침수 및 누수, 결빙 및 동파 등이 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

1) 철도건축물 지붕 및 홈지붕에서 발생하는 우수처리는 그 지역의 강우량 및 혹한기 동파방지를 고려하여 개별(단독)로 처리하는 것을 원칙으로 하며, 역구내의 전반적인 배수체계를 노반 등 관련분야와 사전협의 하여야 한다.

2) 처마홈통(Gutter) 및 선홈통 규격은 지붕면적, 시간당 최대 강우량 등을 기준으로 하되, 혹한기 눈․비의 결빙 및 동파로 인한 누수방지를 고려하여야 한다.

3) 선홈통의 길이는 최대한 짧게 계획하고, 굴곡부(꺾임) 및 접속부 등을 최소화하여야 하며, 관경은 혹한기 동파방지 및 유지관리 등을 고려하여 최소 ∅200mm이상(권장)으로 한다. 또한, 홈지붕의 경우 깔대기 홈통의 기울기는 원활한 배수를 위해 15˚ 이상의 기울기를 확보하여야 한다.

4) 유속이 빠른 우수배관을 사용할 경우는 배관의 기밀성을 고려하고, 배출부위에서 우수가 넘침 없이 원활히 배출될 수 있도록 배출부위에 맨홀 등의 설치를 고려한다.

5) 혹한기 결빙 및 동파방지 등을 위해 추락방지 시설(돔형태의 경우 안전난간 등), 스노우 가드(Snow Guard)설치, 처마홈통(Gutter) 루프드레인(R․D) 주위에  펀칭처리된 지붕덮개 설치, 선홈통 굴곡부 및 접속부 에 열선 및 배관 보온 등을 종합적으로 검토하여 필요시 설계에 반영하여야 한다.

6) 홈통은 녹 및 부식이 발생되지 않는 자재를 사용한다.

7) 구조물 이음부(E·J부분)에 대한 누수방지를 위해 U자형 홈통 등으로 유도배수를 설치하며, U자형 홈통은 유지관리에 지장이 없는 규격으로 진동, 탈락 등이 되지 않게 설치한다.

8) 선하역사의 경우 지붕(슬래브)을 설치하고, 방수처리를 하여야 한다. 구조체 슬래브 하부와 선하역사 지붕 슬래브 사이는 유지보수 및 점검을 위한 1,800mm 이상 공간 확보를 원칙으로 하되, 현장여건상 곤란할 경우 발주기관과 협의하여 조정할 수 있다.

거. 제로에너지 인증 대상 건축물은 에너지 소요량 감소 및 에너지 자립률 향상을 위해 고단열, 고기밀 창호, 고효율 펌프, 고효율 냉·난방기기 사용 및 신·재생에너지설비를 적극 활용하여 설계하여야 한다.

너. 열선 및 배관보온(보온재 등은 화재발생이 없는 것으로 사용)을 위한 설비의 전원은 전기 등 관련분야와 협의하여야 한다.

1.3. 배치 계획

가. 부지에 접한 도로와 상위계획(개발, 실시계획) 등 제반 여건 및 관계규정 등을 고려하여 대지활용도를 높이고 건축물의 위치, 대지현황과 인접대지·시설, 대중교통 등과의 연계성을 고려하여 배치계획을 하여야 한다.

나. 지형조건을 고려하여 녹지공간, 주차장구역, 차랑/보행자 진출입 구역 등 대지이용계획을 결정하여야 한다.

다. 주변 시설과 조화를 고려한 합리적이고 친환경적인 배치계획을 하여야 한다.

라. 외부의 적정 휴게공간과 내부시설 간의 접근성, 환경, 일조 및 기류환경을 고려하여 계획한다.

마. 효율적인 접근성 확보와 편의성을 고려한 사용자 중심의 배치안을 계획한다.

바. 합리적인 동선계획(차량, 보행, 주차 등) 피난 및 안전을 고려한 시설물 배치계획을 한다.

사. 장기적으로 부지 활용을 극대화하여 미래지향적인 공간체계가 될 수 있도록 계획안을 제시하고, 제시된 구획공간을 활용하여 건축물을 배치 계획한다.

아. 도로와 인도, 사업부지와의 대지 레벨차를 고려한 최적의 배치계획을 하여야 한다.

자. 역사 계획 시 승하차인원, 열차횟수를 확인하고, 역무․현업․지원시설 규모 등이 최적화되도록 계획하여야 한다.

차. 여객 동선은 외부출입구에서 승강장에 이르기까지 명확한 동선으로 계획 한다.

카. 여객의 주된 유동축을 중심으로 지역 내 교통수단과의 연계성을 확보하도록 계획 한다.

타. 역사 배치 시 토목분야의 정거장 관련 도면(선로 평면도, 선로 단면도, 부지계획고 등)을 검토하고 협의하여, 사유지 침범이 최소화되도록 계획하여 보상비를 줄이고 보상민원에 따른 착공지연 등이 최소화 되도록 한다.

파. 도로, 하천, 택지, 도시계획 기타 다른 분야와 관계되는 경우에는 이에 따른 관계법규 및 규정에 의하여 설계하고, 관계 행정기관 및 우리 공사내 각 분야(토목, 건축, 전기 등)와 충분한 협의를 하여야 한다.

버. 건축배치도 작성시 주변 건물현황, 용지경계선, 선로배선 등을 표시하되, 선로 배선도와 가능한 동일 축척으로 작성한다.

1.4. 교통계획

가. 철도와의 원활한 환승을 위해 버스, 택시, 승용차, 자전거 등의 접근 교통체계를 검토하여 설계하되, 관계 행정기관의 교통분야와 협의하여 결정 한다.

나. 역에 접근하는 교통수단은 역사 가까운 곳에 진출입 교통체계를 갖추어 여객의 이동거리를 최소화 하도록 계획한다.

다. 환승시설(버스, 택시, 승용차)은 가급적 수단별로 동선이 분리되도록 계획 한다

라. 철도와 철도가 연계될 경우 환승이 용이하도록 동선계획을 수립 한다

1.5. 역사 등의 규모 및 형태 계획

가. 역사의 형태는 지역 특성, 입지여건 등을 파악하고 상징성․기념성․예술성 등을 확보하여 계획하여야 한다.

나. 역사 규모는 이용하기 편리하고 경제적인 설계가 되도록 한다.

다. 역사의 층수는 각 소요 기능실별 용도 및 특성을 고려하여 결정하여야 한다.

라. 이용여객, 근무인원, 기계장비들의 특성을 고려한 적정면적을 확보하되, 불필요 공간은 최소화 하여야 한다.

마. 기능실의 용도와 특성을 고려한 배치를 하여 층고 조정 등 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

1.6. 건물 내부공간 및 디자인 계획

가. 수준 높은 역사 건설을 위해 조형미를 고려한 구조계획, 쾌적한 환경이 유지될 수 있는 공간계획을 하여야 한다.

나. 평면계획 시 기능실의 위치, 층별 배치 등은 각 실의 기능 및 특성을 고려하여 계획하되, 각 실간의 연계성을 감안하여 계획하여야 한다.

다. 내부벽, 바닥, 천장의 디자인 개념을 명확히 하여 역사의 이미지를 부각시킬 수 있도록 설계하여야 하며, 특히, 콘코스 및 대합실 또는 승강장 벽면은 지역의 특성이 잘 나타나도록 고려하여야 한다.

라. 건물 내의 칸막이벽 계획 시, 방화구획 및 각종배관 등에 지장이 없는 벽체는 벽체의 이동 등을 감안하여 조립식 경량칸막이로 설계하여야 한다.

마. 사업 노선의 특징 또는 이미지를 나타낼 수 있도록 디자인(외부캐노피 포함)을 검토하여 계획하여야 한다.

바. 기타, 건물에 필요로 하는 각 실의 설계기준 조건 등은 발주기관과 협의하여 설계를 진행하여야 한다.

사. 기기 반출입이 용이하도록 계획하고 도면에는 각종 Sleeve 및 Opening 등을 표현하여야 한다.

아. 천장고가 높은 콘코스(대합실)의 경우 필요시 중간에 층(중2층)을 두어 상․하부 공간을 적극 활용하는 등 효율적인 공간이 되도록 하며, 필요시 작업발판(캣워크) 등을 설치하여 유지보수가 용이하도록 하여야 한다.

1.7. 동선 및 기능실 배치 계획

가. 동선은 단순화 및 최소화하여 혼잡이 발생하지 않도록 계획하여야 하며, 유동공간은 방향성이 확보되도록 설계하여야 한다.

나. 대합실, 광장 등 여객이 많이 이용하는 주요공간은 필요시 패턴디자인 및 환경디자인을 계획하고, 마감재 및 조명을 통해 명확한 방향을 유도할 수 있도록 한다.

다. 화재·비상 시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선계획을 수립한다.

라. 각종 시설은 중앙집중화하여 통제가 편리하고, 운용이 합리화되도록 설계하여야 한다.

마. 기능실 등 지원시설은 역사 내 유휴공간(교각 및 계단 하부 등)을 최대한 활용하여 경제적인 설계가 되도록 하고, 소음․진동에 대한 대책을 수립하여 계획한다.

바. 역무관련 시설은 관리가 용이하게 집중배치하여 운영요원이 최소화 되도록 한다.

사. 대규모역의 화장실은 여객동선을 고려하여 분할 배치계획 할 수 있는바, 이 경우 여객 집중 동선 상의 화장실은 활용 빈도가 높으므로 변기수를 집중 배치한다.

아. 여행안내소는 매표실, 역무실, 전산실, 자동발매기실로 구성하되 매표실, 역무실, 전산실은 일체형 구조로 설계하여 상호보완이 가능하도록 설치하여야 한다.

자. 통합서비스실과 여행안내소는 분리 또는 완전개방이 가능한 구조로 설치하여야 한다.

차. 여객․역무공간과 각종 지원시설은 동선을 분리한다.

카. 엘리베이터는 각측에서 잘 보이는 위치에 배치한다.

타. 역무실 내 책상, 각종기기 등에 대한 최적의 배치계획을 수립한다.

1.8. 단면 계획

가. 기능별 ZONING을 통해 서로 독립되면서도 상호연관성을 가질 수 있도록 하며, 원활한 수직, 수평동선을 고려하여야 한다.

나. 각 용도별 및 실별의 적정 천장 높이를 감안하여 천장고를 계획하되 과도한 층고 계획으로 인한 불필요한 공사비 및 에너지 낭비요인이 없도록 계획하여야 한다.

다. 인근 주변 환경을 고려하여, 최적의 안정성과 경제성을 확보할 수 있는 단면계획을 하여야한다.

라. 가급적 건물 내부에 단차가 생기지 않도록 계획하여 계단 등 단차 해결을 위한 구조물로 인한 동선이동의 불편함이 없도록 한다.

마. 강우 시 유입을 방지하고, 인접도로면과 인접부지 지표면을 고려하여 설계한다.

바. 층고는 각 실의 특성 및 시설 운영에 충분한 천장고를 확보하고 기계설비, 전기설비, 구조시스템 및 유지관리측면을 고려한 높이 이상으로 계획하여야 하며, 필요시 작업발판(캣워크) 등을 설치하여 유지보수가 용이하도록 하여야 한다.

1.9. 입면 계획

가. 주변과 조화를 고려한 입면계획을 수립한다.

나. 공사비를 감안하여 경제적이고 미려한 외장 마감, 옥상 조경계획을 적용하여야 한다.

다. 외관의 창호는 창호의 사양은 미관 및 기능이 우수한 제품을 사용하여야 하며 부속자재는 창호 사양과 조화되는 제품을 사용하며, 창호는 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 적합하여야 한다.

라. 외관의 창호는 열 손실, 소음 등의 영향을 최소화 하도록 하되, 공기조화설비의 미가동 시간에도 충분한 자연환기를 할 수 있도록 개폐면적을 고려하여 설계하여야 한다.

마. 각종 기계 및 전기설비로 인하여 외부에 형성되는 루버 등 개구부의 크기 및 재질 등을 감안하여 입면 계획에 반영한다.

1.10. 재료 계획

가. 일반사항

1) 사용자재는 사용연한 및 비용 등을 고려하여 계획하고 불연성, 내구성, 내후성, 내식성, 내수성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지관리비를 절감하는데 적합한 재질 및 마감을 사전에 발주기관과 협의 하여 선정하여야 한다.

2) 화재 발생 시를 고려하여 난연재 또는 불연재로서, 유독가스 배출이 적은 재료를 우선 적용토록 하고 부득이한 경우에는 방염처리 등 대안을 제시하여야 한다.

3) 가능한 한 건식 공법을 채택하고 친환경 페인트 등을 사용하여 인체에 유해한 자재는 최대한 사용을 제한한다.

4) 코어 및 방화구획, 차음 등 불가피한 경우를 제외하고 실의 구획 및 실별칸막이 등은 건식 칸막이로 계획하여 공사비 절감, 시공성 향상 및 공간구성의 가변성을 도모하여야 한다.

5) 마감재는 충분한 검토와 사례조사를 통하여 선정하여야 하며 건물내부가 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없도록 한다.

나. 바닥 마감

1) 재료마감이 상이한 부분은 재료분리대를 설치한다.

2) 기타 실별 용도와 기능을 고려하여 바닥 마감재 또는 마감방법 등을 반영하여 설계한다.

다. 벽 마감

1) 벽체 등 누수 및 결로 발생 가능성이 높은 부분의 벽체는 방수, 단열 및 배수를 고려한 구조로 설계하여야 한다.

2) 사무공간은 가변성에 대비하도록 하며, 각 사무실의 구획을 위해 경량칸막이를 설치 할 경우 이동설치가 가능한 마감으로 계획한다.

3) 조적벽에 설치되는 창호, 출입문 및 점검구 등 모든 개구부의 상단에는 철근콘크리트 인방을 설치하여 구조적 안전성을 확보하도록 한다.

4) 물을 사용하는 공간의 벽체는 습식공법을 적용하고, 벽체하부의 방수턱 상세도를 반영하여 설계한다.

라. 천장 마감

1) 재료의 특성에 따라 적합한 천장틀 구성방법(T-Bar, M-Bar, T&H-Bar 등)을 선택하되, 유지관리(덕트, 배관, 셔터, 셔터구동모터 등 점검)를 고려하여 필요시 점검구를 계획하여야 한다.

2) 캐노피 등 외부노출부분은 습기에 강하고, 물끊기를 설치하여야하며, 강풍에 파손 우려가 없는 구조 방법을 채택하되 입면과 조화가 되어야 한다.

3) 높은 층고를 필요로 하는 시설은 향후 유지관리를 고려하여 마감을 계획한다.

4) 화재안전을 위하여 소방검사에 해당되는 천장 마감재는 난연 또는 불연 마감 재료를 선정 반영하여야 한다.

마. 방수마감

1) 누수 방지를 위하여 모든 층의 우수 및 누수 영향부 바닥은 방수 처리를 하되, 방수공법은 바닥, 벽 또는 지붕 등의 위치에 따라 적합한 공법을 선택하고 최상의 재료 및 시공이 용이한 마감으로 계획하여야 한다.

2) 특히, 전산실 및 전기계통 장비실 등은 우수 및 누수로 인한 피해가 없도록 조치하여야 하며, 전산실 및 전기계통 장비실 등의 위치는 상부층 우수 및 누수 영향이 없는 곳으로 고려한다.

3) 외부로 노출되는 건물 외부의 마감은 실내로의 누수침입이 발생되지 않는 구조로 설계하여야 한다.

4) 지붕 등 주요부위는 구조체의 균열 등에 의한 방수하자 발생을 최소화할 수 있는 공법을 우선 고려하고, 필요시 이중방수를 계획한다.

5) 화장실, 주방, 물탱크실, 공조실, 샤워실 등 물의 사용과 관련된 실은 방수가 완전해야 한다.

6) 최상층 지붕 등에는 관통형 스크류 볼트 등 사용 금지, 단열재 검토 시 누수에 영향을 받는 단열재 사용금지, 실링계 방수재는 방수재가 아니라는 가정 하에 설계하고 불가피한 경우에는 상세도 작성, 발주기관과 협의 한다.

7) 옥상 난간대의 방수턱, 물끊기 홈, 옥상 바닥의 루프드레인, 누름콘크리트 신축줄눈, 물과 접하는 부분의 시공 이음부 방수턱, E/J부분 등은 상세도를 포함하여야 한다.

8) 승강설비의 승강로 하부, 기계실 등이 지하에 위치하는 등 누수의 우려가 있는 곳은 콘크리트구조로 방수 처리를 한다.

바. 기타

1) 사용자재는 내구적이며 유지보수가 용이한 재질 및 마감방법을 택하되, 석면 등 유해물질 함유 자재를 사용하여서는 안된다.

2) 석재 품질규격은 KS F 2530 이상의 모든 석재가 사용 가능토록 범위를 확대하고 설계예산내역서에 원산지 표기 대신 석재 색상과 품질 규격만 표시한다.(예: 30mm 화강석물갈기(00석류,00색))

3) 사용자재의 부속자재는 최적화된 자재를 사용하되 중복 적용되지 아니하도록 하고, 전기식·전자식으로 고객과 직원의 이용편의를 고려하여 선택한다.(예 : 도어록 → 디지털도어록(화재 시에도 정상기능이 확보 가능한 것 사용) 등)

4) 사용자재는 설계의도를 명확히 구현할 수 있는 자재를 선택하며, 설계 시 사용할 주요자재의 두께, 질감, 색상 등을 실물로 확인 하여야 한다.

1.11. 색상 계획

가. 색상계획은 도시경관, 주변환경, 역사의 기능 및 내․외부 등의 특성에 맞게 효과적으로 적용하며, 내부의 색상계획은 동선과 밀접한 연관을 갖고 구별되도록 한다.

나. 색상계획은 재료의 질감과 서로 조화를 이루며, 입면 색상은 너무 균일하게 하지 않으면서 통일성을 잃지 말도록 한다.

다. 실시설계 단계에서는 환경색채전문가가 디자인한 색채환경계획서를 제출하여야 한다.

라. 자재의 색상은 변색 또는 색상조화를 고려하여야 한다.

마. 입면상 주요재료에 대해서는 한국표준색표집 번호(또는 먼셀번호)를 기입하여야 한다.(4방향에서 본 입면도를 칼라로 출력하여 재료 색상별로 도료용 표준색 번호를 기입)

1.12. 흡음 및 방음·방진 계획

가. 내부가 쾌적한 분위기를 가질 수 있도록 각종 소음 및 분진에 대비하여 흡음, 방음, 방진 계획을 고려한다.

나. 각 기능실별 특성을 감안하여 방음, 방진 계획을 고려한다.

다. 소음의 직접유입이 가능한 창이나 개구부의 위치는 선로 반대 측으로 배치하는 것으로 고려한다.

라. 소음‧진동원과 소음‧진동에 민감한 역무시설 등의 사이에는 차폐역할을 할 수 있는 공간 배치를 고려한다.

마. 열차의 소음‧진동‧운전취급 등 소음에 민감한 역무시설, 침실 등은 소음‧진동원으로부터 최대 이격시켜야 하고, 선로 직상부‧직하부 배치를 지양하여야 한다.

1.13. 창 호

가. 실내에 면하는 모든 외기 창은 단열강화 위해 고기밀성 단열창호 등을 적용한다.

나. 외부에 면하는 창은 가급적 자연환기가 가능한 창호로 계획한다.

다. 창호계획은 미관 및 보안적인 측면을 고려하고 열손실방지와 소음, 인접건물에 대한 빛 반사 등의 영향이 없도록 계획한다.

라. 외부로 개폐가 가능한 창문에는 방충망을 설치하되, 창호의 개폐에 지장을 주어서는 안된다.

마. 주 출입문은 방풍실을 설치하여 에너지절감을 고려하되 내부와 외부의 도어 사이의 폭은 충분히 반영하고, 바닥에 드롭매트 설치를 검토한다.

바. 선로 또는 전차선 측 창호에는 추락 및 낙하물 투척을 방지할 수 있는 안전망 등을 설계에 반영하여야 한다.(안전망 설치가 어려운 창호형태 지양)

사. 외부와 접하는 곳, 대합실의 유리강화문 힌지는 방수용으로 한다. 화장실 공간의 칸막이 벽체 상부의 고정방식은 고정부 상세도를 작성한다.

1.14. 안내표지류 계획

가. 역건물, 광장, 콘코스 및 대합실, 승강장 등에 각종 안내표지류를 파악하여 한국철도공사의 「여객안내표지 시행세칙」을 반영한 사인시스템 설치계획(건물 내․외부 위치 및 형태 등)을 설계에 반영하여야 하고, 설치위치, 위치에 따른 규격, 수량 등을 설계도서(도면, 수량산출서, 내역서, 시방서)에 명확히 제시하여야 한다.

나. 조명을 사용하는 안내표지류의 설치장소 및 전기용량 자료를 파악하여 1차측 전원공사를 설계에 반영될 수 있도록 전기분야와 협의하여야 한다.

다. 외관과 조화되게 역명표를 설치하고, 표지류의 설치위치 등에 대하여는 관련기관과 협의하여 반영한다. 또한 인지성을 높이기 위해 필요시 경관조명을 검토한다.

라. 안내표지류는 강풍의 영향을 검토하고, 달대형 안내표지는 가급적 계획하지 않는다.

1.15. 선상연결통로 계획(해당 시)

(1) 통로의 폭은 연결되는 계단폭 이상을 확보하여야 하며 피크시간대 통과하는 환승인원을 고려하여 계획 한다.

(2) 승강장과 연결되는 수직동선(E/S, E/V, 계단)은 교통약자법 등을 검토하여 계획하되, 세부기준을 완화하고자 하는 경우 관련기관에 승인을 받아 계획하여야 한다.

1.16. 에너지절약 계획

공공건물 증축 에너지 절약방안에 따라 열손실 방지 등 에너지 소모를 최소화 할 수 있도록 설계하여야 하며, 녹색건축물 조성 지원법에 따라 에너지 절약계획서 제출 등 관련 업무를 수행하여야 한다.

1.17. 우수처리 계획

가. 지붕 빗물 처리규모 산정은 최대 피크 시 용량 이상을 처리할 수 있는 규모의 홈통을 설치하여야 하며 건축물 내부에서 발생되는 우수가 원활히 배출될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하게 설계하여야 한다.

나. 지붕 구배 계획 시 빗물고임 현상이 없도록 충분한 구배를 주어 우수처리가 원활히 될 수 있도록 한다.

다. 배수시설 계획은 인접 우수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 하며, 배수로의 역류로 인한 현상이 없도록 충분한 배수용량을 검토하여야 한다.

라. 건축물 옥상 등에서 배출되는 유출수는 지반에 흐르지 않도록 적절한 방법으로 기존 배수구에 접속해야 한다.

마. 필요시 우수저장시설 및 활용시설 계획을 검토하여야 한다.

바. 승강설비의 승강로, 기계실 등은 우수 침입이 되지 않도록 트랜치, 적절한 차양 길이 등을 검토한다.

1.18. 인테리어 계획

콘코스 및 대합실, 여객화장실, 수유실, 연결통로는 이용객이 쾌적하고 편리하게 이용할 수 있도록 계획하여야 하며 실시설계 단계에서는 별도의 인테리어 설계를 시행하고 별도의 성과물(내부 전개도, 내부투시도 등)을 제출하여야 한다.

1.19. 역무시설 및 처소 계획

가. 역무공간은 매표, 판매등의 통합서비스를 위한 통합서비스실과 고객응대 및 민원해결 등을 위한 여행안내소로 구분 설치한다.

나. 직원이 근무하는 사무실 등은 일조, 채광, 통풍, 환기를 고려하여 가급적 1면 이상 외기에 접하도록 계획한다.

다. 역무공간의 공간 활용도 제고를 위해 침실 및 탕비실을 제외한 벽체는 가변형 설계를 고려한다.

라. 시․종착역에는 열차운영계획을 검토한 후 필요시 승무원주박소(휴게실, 침실), 검수원사무실(침실 포함), 전동차 청소용역원 처소(남, 여 구분)를 설계에 반영 한다

마. 침실 또는 휴게실의 옷장, 신발장, 이불장 및 창고에 선반을 설치할 경우에는 붙박이형식으로 설계한다.

바. 역무공간 매표실 등은 이중바닥 구조로 적용하고 다른 실의 바닥과 단차가 없는 구조로 한다.

1.20. 기타 설계에 관한 사항

가. 외부 출입구 위치는 지상 대중교통 수단과의 연계성 및 이용객의 접근성을 검토하여 결정한다.

나. 역사내 각종 편의시설, 콘코스 및 대합실 의자 등을 설계에 반영하여야 하며, 편의시설(편의점, 음식점 등)은 집중 배치하여 공간의 효율성을 높인다.

다. 대합실 반자에서 상부 슬라브까지 높이를 고려하여 필요한 경우 설비의 유지보수를 위한 작업발판(캣워크)을 설치하여야 한다.

라. 건축물의 각종 배관을 위하여 피트(Pit), 수직덕트(Shaft) 등이 필요한 경우 기계분야, 노반분야와 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

마. 건축물의 지붕, 건물 내․외부의 고소부 등 일반적으로 보수, 청소가 어려운 부분에는 작업자 안전을 위하여 안전난간, 안전고리 등 유지관리, 청소를 위한 시설물을 설계에 반영하여야 한다.

바. 승강장에 기둥, 구조물 등 설치로 인하여 시공 시 기존 설비(승강장안전문(PSD) 등)와 저촉될 경우 설비의 이전, 재설치를 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

사. 모든 도면은 일관된 흐름을 갖도록 하고, 특히 단계별 시공계획, Pattern Design, 공사 시행시 주의를 요하는 부분, 구체와 설비의 접합부, 세부 마감상세 등은 현장 기능공이 쉽게 판독할 수 있도록 작성하여야 하며, 도면 표기가 곤란한 부분에 대하여는 도면에 별도 주서를 하여야 한다.

아. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방․조경 등 관련공사 부분이 명확히 구분되도록 설계도면에 표현하여야 하며, 업무구분이 불분명한 사항은 발주기관과 협의하여야 한다.(특히, 전기, 통신, 소방설비 등에 의한 골조 관통부 마감처리, 지하매설물에 의한 관통부 지수처리 등을 명확히 구분되도록 한다)

자. 편의시설 설치 위치에 Pit, 전기, 수도설비 등을 반영하여야 한다.

차. 역사 등 외부 계단 출입구 캐노피, 홈지붕과 승강장계단 접속부 측면은 외기(비, 비들이침, 낙하물 등)의 영향이 없도록 설치한다. 다만, 건축물의 특성, 설치 위치 등 현장여건을 고려하여 분야간 인터페이스 협의를 통하여 길이를 조정할 수 있다.

카. 건물 유지보수를 위한 설비(청소용 고리, 내․외부 유지보수 기계설비 등)를 설계에 반영한다.

파. 광역철도역의 매표설비는 RF(교통카드) 이용율 증가를 감안하여 무인운영을 전제로 한 자동화설비로 설치한다.

타. 광역철도역은 여객편의(매표, 판매 등)와 여객안내(역무기능)를 결합하여 통합서비스를 할 수 있도록 계획하여야 한다.

하. 안전장비(안전모, 안전화 등)의 관리를 위한 별도 공간이 필요한 경우 설계 시 협의하여 설치할 수 있다.

거. 바닥 악세스플로어 등 이중바닥구조는 다른 실의 바닥과 단차가 없는 구조로 한다.

2. 구조분야

2.1. 일반사항

가. 구조설계는 합리적인 구조계획과 정밀한 구조계산에 의하여 어떠한 경우에도 구조물이 안전하여야 하며, 기준에서 정한 값 이상의 소음․처짐․진동 등이 발생하지 않아야 한다. 또한, 유해한 환경에 대한 내구성을 확보하여야 한다.

나. 모든 공정은 일반적인 방법으로도 시공할 수 있는 구조로 하며, 특수공법을 택할 경우는 시공 안전성, 경제성 등을 복합적으로 고려하여야 한다.

다. 공기단축 및 공사비 절감 등 경제성을 확보하고, 구조부재의 단순화를 통하여 현장 시공성을 높일 수 있도록 계획한다.

라. 구조물은 건축물의 내구연한을 고려하여 유해한 균열이나 침하를 방지하고, 철근이나 철골의 부식이 발생하지 않도록 설계되어야 한다.

마. 구조형식 및 단면의 크기 등은 계획 및 시공성과 안정성 및 사용성(처짐, 진동)을 고려하여 정하여야 한다.

바. 구조의 안전성능 및 사용성능은 국토교통부에서 정한 구조기준을 모두 충족하여야 한다.

사. 국기 게양대 등의 옥외 부속물 및 건물의 외벽이나 지붕 마감재 등은 태풍, 폭우, 폭설시 하중 지지력이 취약한 중심부에 설계기준 범위내의 하중이 가해져도 안전한 구조로 하여야 한다.

아. 해당 시설의 규모, 지역의 특성 등을 고려하여 풍동시험, 실물대시험 등을 검토하고, 강풍 시에도 안전한 구조로 하여야한다.

자. 기초형식은 지반조사 자료(현황조사) 및 현장 주변여건을 감안하여 경제적이며 합리적인 형식이어야 한다.

차. 지반특성, 하중조건, 구조형식 등을 고려하여 설계하여야 한다.

2.2. 내진설계

설계 기준의 적용에 있어 지진에 대비하여 안정성을 확보할 수 있도록 특등급(IO) 내진성능등급기준을 갖추어야 한다.

가. 적용기준

1) 건축구조설계기준(KBC)

2) 콘크리트구조기준

3) 구조물기초설계기준

나. 상기에 언급된 적용기준 이외의 기준을 참고기준으로 적용할 수 있으며, 이때 범용되는 기준을 사용하고 이를 명시한다.

다. 적용기준 및 규칙은 최신의 기준이 우선한다.

라. 비구조체(조적벽체, 반자, 악세스플로어 등)의 내진설계를 고려한다.

2.3. 구조시스템 계획

가. 구조설계보고서(구조계산서)는 구조시스템의 특성(구조형식/부재)을 확인할 수 있도록 작성되어야 한다.

나. 기둥, 보 및 내력벽의 배치는 합리적이어야 한다.

다. 구조부재의 배치 및 구조형식은 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

라. 구조형식 및 단면의 크기 등을 결정할 때는 시공성을 고려하여야 한다.

마. 구조물의 균열은 KBC기준에서 정하는 허용 균열폭 이내가 되도록 하고, 과도한 균열이 예상되는 부위에는 원인을 분석하여 적절한 보강대책을 수립하여야 한다.

바. 응력 전달 효율이 높고 현장에서의 작업이 용이한 방법이어야 한다.

사. 외력 또는 온도 변화로 인한 구조체의 변형을 최소화하기 위하여 익스펜션죠인트(Expansion Joint)를 설치하거나 이에 갈음할 수 있는 구조형식 및 근거를 제시한다.

아. 2차 응력 및 변형, 처짐의 발생이 최소화 되는 구조이어야 한다.

자. 공기단축 및 공사비 절감 등 경제성을 확보하고, 구조부재의 단순화를 통하여 현장 시공성을 높일 수 있도록 계획하여야 한다.

차. 아래와 같은 경우에는 Expansion Joint를 설치하거나, Expansion Joint를 설치하지 않을 경우 변형이나 기타 균열을 방지할 수 있는 공법 및 근거를 반드시 명시하도록 하고, 지진 시에는 Expansion Joint가 Seismic Joint 기능을 갖도록 한다.

1) 하중이 편중되거나 부재간의 강성의 차이가 심할 경우

2) 건물의 길이가 길어지거나, 이형 평면 형태로 인하여 수축․팽창에 의한 변형 및 균열 예상 될 경우

카. 장스팬 구조는 합리적인 구조시스템을 선정하여 사용성을 고려한 구조 계획이 되게 한다.

타. 굴착 및 되메우기 구간의 지하 구조물에 대한 안전성 확보를 위하여 정밀하게 해석하고 검토한다.

파. 지진력에 대한 시뮬레이션을 바탕으로 안전한 구조시스템을 구축한다.

2.4. 구조 계산

가. 하중, 응력, 단면 계산 등 모든 계산은 약산으로 하여서는 안 된다.

나. 응력 계산은 실제 구조물에 가장 부합하는 방법으로 하여야 한다.

다. 하중 및 응력 계산은 가장 불리한 경우를 기준으로 하여야 한다.

라. 하중 및 응력 계산은 정밀하게 계산하여야 한다.

마. 계산서는 근거와 과정 및 결과를 제 3자가 쉽게 알 수 있도록 건축구조 기술사가 작성하여야 한다.

2.5. 구조 설계

가. 모든 부재의 설계에 적용된 해당기준을 명시한다.

나. 참고기준은 구조설계 시 특별히 참고하여 적용할 경우 규준 및 지침 등을 표기한다.

다. 설계기준의 적용에 있어 단일기준(같은 계열의 참고기준 포함)을 일관성 있게 적용하도록 한다.

라. 설계하중

1) “건축구조기준”에 준하여 적용한다.

2) 칸막이벽은 위치 변경을 예상하여 그 위치가 어디로 변경되더라도 구조상 안전하도록 하중계산을 하여야 한다.

3) 구조물 상부에 흙을 덮어 조경을 하는 부분은 포화상태 함수율을 고려한 흙의 중량을 설계하중에 포함시킨다.

4) 공동구 등 구조물 상부로 차량이 통행하는 부분은 그 중량 (시공차량, 비상차량 등 차량활하중포함)을 감안하여야 한다.

5) 지상 및 지하 주차장에 적용되는 하중은 차량의 최대 활하중을 고려한 영향을 파악하여 차량의 이동에 따른 균열이 발생 하지 않도록 해석, 설계하여야 한다.

가) 고정하중

- 구조재 및 마감재 등의 실재중량을 계산하여 적용한다.

나) 활하중

- 주차장의 활하중은 화물차량의 차륜압에 대한 고려를 하여야 한다.

- 각 건물의 기능, 소요실별 제반특성을 고려하여 필요하다고 판단될 때는 증가시켜 설계에 반영하고, 특수설비가 설치된 실은 별도 계산한다.

- 활하중에 의한 패턴하중을 고려하여 가장 불리한 경우의 하중에 대하여 휨 및 전단력을 결정한다.

- 기계설비의 하중은 기계설비(전산실, 공조실, 기계실, 전기실 등)의 하중 조건에 따라 설계한다.

- 지하 구조물 상부가 외부 주차장인 경우에는 그 중량(차량 활하중포함)을 감안하여야 한다.

- 예술장식품을 설치하는 경우 장식품의 위치와 하중을 고려하여 하중을 산정 및 적용하여야 하고 선정 근거를 첨부 하여야 한다.

다) 풍하중

- “건축구조기준”에 준하여 적용한다.

라) 지진하중

- “건축구조기준”에 준하여 적용한다.

- 내진구조의 특성을 감안하여 지진하중을 고려한다.

마) 수압

- 지표면 하부의 구조설계에서는 지역 또는 대지 내 토층 여건과 폭우 시 지하수위 상승 등에 의한 부력을 감안하여야 하며, 공사 중의 부상여부를 포함한 제반사항을 검토하여 설계하여야 한다.

- 설계수위는 지반조사보고서에 근거한 지질전문가의 판단에 따라 결정되어야 한다.

바) 온도하중

- 건물의 설계 시 온도응력의 발생이 구조물의 거동에 영향 을 미친다고 판단될시, 온도하중을 반영하여 하중효과를 고려하여야 한다.

사) 적설하중

- “건축구조기준”에 준하여 적용한다.

아) 부재 설계

- 각 부재 설계과정은 구조계산서상의 흐름과 구조도면의 결과가 연계되도록 작성되어, 객관적인 검토가 용이하도록 하여야 한다.

- 전산 프로그램에 의한 부재설계 출력물은 이해하기 쉽게 작성하고, 부재별로 대표적인 경우에는 설계 기준에 따른 계산으로 작성 하여 첨부하도록 한다.

- 출력 Format만으로 산정 내용의 파악이 어려운 경우에는 수 계산에 의한 산정 자료 (임의 부재 선정)를 첨부하여 출력된 Data의 값과 부합됨을 확인할 수 있도록 표기한다.

- 각 부재의 단면 산정 결과는 배근약도 등으로 제시하도록 한다.

자) 부재 단면 설계

- 부재 단면은 철근의 이음 및 정착이 집중되는 부위에서도 콘크리트 부어넣기가 용이한 크기 이상이어야 한다.

- 유효 단면 춤은 철근의 피복 두께를 건축 공사 표준시방서를 기준으로 하여 산출한다.

- 부재 단면(또는 철근량)은 실 용도의 변경, 예상치 못한 2차 응력 발생, 시공오차 등을 감안하여 단면계산에서 산출된 것보다 할증을 고려하여야 한다.

- 장스팬의 지붕구조는 실용성을 고려하여 경제적이고 합리적인 구조 형식이 되도록 하여야 한다.

- 부재 내에 매입되는 각종 배관 및 단열재 등으로 인한 단면 손실을 고려하여야 한다.

차) 기초설계

- 기초설계시 건축물 기초구조 설계기준(KDS 41 20 00)을 따른다.

- 기초형식은 건축구조기술사와 토질 및 기초기술자가 협의하여 결정하고, 기초지반의 허용 지지력은 토질 및 기초기술사의 판단에 따른다.

- 지반조사 결과를 바탕으로 기초형식을 설계하여야 하며, 파일지정으로 설계할 경우에는 소음발생으로 인한 민원이 발생되지 않는 공법으로 설계하여야 한다.

- 지하층에 대한 굴착 시 흙막이 설계가 필요한 경우 현장여건, 지질, 지하수위 등을 고려하여 적합한 흙막이 공법으로 설계하여야 한다.

- 하나의 구조물에 설치되는 기초형식은 가능한 동일한 형식으로 하며, 이 기초의 최대 침하량과 부동침하량을 예측하고, 이 값이 건물에 영향을 미치지 않도록 허용치 이내가 되도록 설계하여야 한다.

- 지질조사 보고서를 근거로 하여 설계용 지하수위를 결정하고, 건물의 부력을 검토한다. 검토결과 필요시 지하수 대책방안을 강구하여야 하며, 부재설계 시 내력 및 구조의 안전성을 확보하여야 한다.

- 신기술, 신공법 : 신기술 및 신공법의 적용이 가능하도록 설계하여 시공성 및 경제성 등을 적극 고려한다.

3. 토목분야

3.1. 일반사항

가. 수급인은 사용대지의 상황을 파악한 후 설계에 반영하여야 한다.

나. 설계에 적용하는 공법은 적용 가능한 복수의 공법에 대한 경제성/안정성/시공성을 비교 분석한 후 설계에 적용하도록 한다.

3.2. 세부지침

가. 하수도계획

1) 환경부제정 하수도 설계기준 등에 의하되 기존 배수시설(계획) 등을 충분히 조사한 후 우수·오수량 추정과 배수방식 및 유량계산을 실시하여 설계 및 사업 시행에 차질이 없도록 하여야 한다.

2) 하수도설계는 배수처리가 용이하도록 주변 도로의 하수도 관경, 매설 심도 등을 충분히 고려하여 설계하여야 한다.

나. 배수계획

1) 배수계획은 우·오수분류식으로 계획하되, 해당지역의 배수배제 방식을 우선으로 한다.

2) 우·오수관로의 교차부분을 감안 오수관로는 우수관로보다 깊게 하고 동일 경로로 계획하며, 간선배수시설까지 분류식으로 연결하여야 한다. 단, 인접도로 계획에 따라 변경될 수 있다.

3) 관거는 직선으로 부설하고, 굴곡부는 예각 및 직각으로의 접합을 되도록 피하며 침하되지 않도록 설계한다.

4) 우·오수관의 매설심도 및 이격거리는 하수도 시설 기준을 준수한다.

5) 기타 빗물받이, 측구, 연결하수관 등의 세부구조는 관련 법규 등에 의한다.

6) 빗물받이, 우수, 오수맨홀에서 연결되는 연결관은 충분한 단면적 및 구배를 확보하여 침전으로 인한 막힘이 없게 설계하여야 한다.

다. 포장계획(부지내 차도, 보도, 주차장)

1) 부지 내 포장 두께는 기능에 따른 적정하중 등을 감안하여 현장여건에 따른 시험치 및 설계법에 의하여 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소 두께로 설계하여야 한다.

2) 주차장시설은 주차장법 및 효율적인 주차장운영에 적합하도록 설계하여야 한다.

라. 가설계획

1) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사보고서에 의하여 작성하되 지하수 유·무, 굴착에 따른 민원, 주변구조물 피해, 경제성 등을 고려하여 2개 이상의 공법을 비교 검토 후, 적합한 공법을 선정하여 설계하여야 한다.

2) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반 설계정수는 지질조사 결과 또는 관련 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며, 적용 근거를 첨부하여야 한다.

4) 관련법령에 따른 인허가 또는 협의가 필요할 시 수급자의 책임하에 제반절차를 이행하여야 한다.

5) 흙막이 가시설 계획은 안정성이 확보되는 전제하에 경제성, 시공성, 공사기간 등을 고려하여 가장 합리적인 공법으로 계획하여야 한다.

마. 부력방지계획

부력방지공 설계는 반드시 건축구조기술사와 협의하여 진행토록 하며, 사전 지하외벽설계수위를 결정하여 시스템을 선정토록 한다.

바. 기초계획

기초설계는 건축구조기술사와 협의하여 진행하되, 기초설계의 기준은 국토교통부 고시 구조물기초 설계기준, 도로교 설계기준 등을 따른다. 또한. 지진 및 풍하중에 의해 발생하는 말뚝의 횡력, 축력에 충분히 저항할 수 있는 설계가 되도록 하여야 한다.

사. 연약지반 처리계획

부지내 연약지반 존재 시 암밀침하 및 잔류 침하량 등을 검토하여 필요시 적정한 연약지반 처리계획을 수립한다.

4. 기계설비 및 기계소방 분야

4.1. 계획방향

계획방향은 신기술, 신공법, 친환경기술 도입, 기계설비 기술기준 충족 등을 통한 설계로 환경 친화적이고 경제적인 시스템이 되도록 하고, 국가의 에너지수급 절약시책 및 환경관련법규 등을 적극 수용한 계획이어야 한다.

4.2. 설계 일반 사항

가. 본 기계설비지침은 아래와 같은 사항을 고려한 설계가 되어야 한다.

1) 안전하고 쾌적한 공기환경을 유지할 수 있을 것

2) 경제성이 뛰어난 방식이며, Space를 유효하게 이용 가능한 시스템 계획

3) 설비의 신뢰성이 높은 방식일 것

4) Energy saving, 환경부하의 절감이 가능할 것

5) 장비교체를 위한 장비 반입대책(완충공간포함)이 고려되어야 한다.

6) 기계설비의 시공, 감리, 유지관리 등을 고려하여 합리적으로 설계할 것

7) 공정관리에 지장이 없고 하자 책임 구분이 용이하도록 기계설비와 건축 등 타 분야의 공종을 구분하여 설계할 것

나. 소방 기계설비는 건축의 방화계획과 전기의 소방 전기설비 및 방재 계획과 유기적으로 연결되어 감지, 제어할 수 있는 시스템으로 계획되어야 한다.

다. 건축계획 시 기계설비 계획에 대하여 사업책임기술자와 충분히 협의하여야 한다.

라. 주요시스템 계획 시는 경제성, 장단점 비교 및 기타사항을 고려한 설계방안을 연구, 검토하고 그 결과에 따라 설계에 임하여야 하며 또한, 모든 비교 분석은 공정타당성이 있어야 하고 주관적이어서는 안 된다.

마. 부하계산은 최대부하, 연간부하 등을 예측하여 생애주기비용(LCC) 분석을 통해 장비 및 시스템 선정에 사용되어야 한다.

바. 건축구조물과 마감재 및 전기통신 시설물이 교차되는 부분에는 각 분야별로 종단면이 포함된 장비 및 배관덕트의 세부적인 입체도면을 각각 작성한다.

사. 장비, 배관, 덕트의 하중 및 운전부하 하중을 고려하여 지지물의 위치별로 설비자체 지지물의 구조계산서 및 세부설계도서를 작성한다. 단, 건축구조에 반영되는 지지물은 건축구조계산에 반영되도록 한다.

아. 냉온수, 급수라인의 수압 및 수격에 의한 변위지점과 EXP-JOINT의 운전하중을 고려하여 세부설계도를 작성하고, 필요시 변위에 대한 계산서 및 지지물의 구조계산서를 작성한다.

자. 열원(태양, 지열, 전기, 가스, 경유 등), 공조방식, 냉․난방 방식, 환기방식, 공기여과방식, 배관 및 덕트 재질 등 시스템 및 자재 선정 시 생애주기비용(LCC)을 검토하여 선정하여야 하며, 생애주기비용(LCC) 검토는 “설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침”에 준하여 시행하여야 한다.

차. 각종 배관, 덕트 등을 위하여 피트(Pit), 수직덕트(Shaft) 등이 필요한 경우 협의하여 반영하여야 한다.

카. 시공방법자재 및 장비류에 대한 시방서를 작성하고, 특수한 공정이나 특수 장비에 대해서는 반드시 특기 시방서를 작성한다.

타. 시공 중 주변 환경에 피해를 주거나 민원이 발생하지 않도록 설계 시 충분히 고려하여 대책을 강구하여야 한다.

파. 집단에너지 공급대상 의무지역에 대하여 공공기관 및 관련 사업장에 문의 확인하여 적용유무를 확인 후 적합한 열원방식을 검토한다.

하. 해당 건설사업의 에너지사용계획서 이행사항을 설계에 반영하여야 한다.

거. 건축물의 설비기준 등에 관한규칙 및 에너지이용합리화법에 의하여 에너지 이용 등에 있어서 친환경에너지(태양열, 지열, 지하수 등)를 활용한 System을 우선적으로 반영될 수 계획하되 에너지절약, 유지관리 등을 고려하여 그 효율을 극대화 할 수 있는 시스템으로 설계하여야 한다.

너. 지중열교환기(지열)와 오수처리시설 등을 설치할 경우 사용개소 인접에 배치토록 계획하여 반송에너지를 절감하고 관련 장비의 소형화를 이룰 수 있도록 계획하여야 한다.

더. 배관, 중간밸브에는 용도를 알 수 있는 명판을 일정간격으로 설치 한다.

러. 유수검지장치실, 소방설비 말단 테스트 밸브 등은 여자화장실 내부를 피하여 계획한다.

4.3. 설계 시 고려사항

가. 기계설비의 모든 공종은 주요 장비의 내용연수를 설계에 반영하여야 한다.

나. 지역적 특성을 고려한 설계를 반영한다.

4.4. 설계지침

가. 옥외배관

1) 별도의 공급자로부터 공급받는 간선시설(상수도, 도시가스 및 지역 난방)에 대하여는 관련공급자와 충분한 사전협의를 통하여 공급가능 여부, 인입지점 및 인입관경을 결정하여야 하며, 타 공종의 인입지점(전기, 통신, 기타) 과의 상호 관련사항을 확인 하여야 한다.

2) 타 공종과 관련된 부분에 대해서는 반드시 사전협의를 필하고 구조보강 등 보완 대책을 강구하여야 한다.

나. 열원설비

1) 개념 설계에서 도출된 열원설비의 내용에 따라 세부적인 결과를 설계설명서에 첨부하여야 한다.

2) 부분 부하운전 및 대수제어에 대비한 시스템으로 구성한다.

3) 년 중 열원공급이 필요한 장소의 장비사고 등에 대비한 열원의 안정적인 공급을 위하여 열원장비의 BACK-UP기능을 구성하여야 한다.

4) 냉.난방설비는 각 실 및 기능에 따라 냉.난방 구획여부 등을 검토하여 열에너지를 효율적으로 운영할 수 있고, 쾌적한 실내 환경 유지와 원가절감이 가능하며 유지관리가 간편한 방식을 채택하여 에너지절감을 유도할 수 있도록 계획하여야 한다. 또한, 기능실(기계실, 전기실, 전산실 등)은 역무실, 대합실, 숙직실 등과 분리시켜 독립적인 냉·난방을 설비를 계획하여야 한다.

5) 옥탑층에 냉각탑을 설치할 경우 건물주위에 대한 환경적인 영향을 고려하여 계획

6) 기계실, 공조실, 팬룸, 각종 샤프트 계획은 향후 유지보수 및 확장이 가능하도록 충분한 공간을 확보하며, 점검관리를 위하여 사다리, 발판, 가대, 훅크 등이 유효적절하게 배치되도록 계획한다.

7) 냉각탑을 설치할 경우 동절기 냉각수 운전 저하에 따른 냉동기 운전대책을 수립하여야 한다.

8) 배관 및 설비에 결로가 발생하지 않는 보온두께 계산서 및 적용 구조체와 분리될 수 있는 배관 및 장비 방진설비를 계획한다.

다. 공조설비

1) 공기조화, 냉․난방 및 환기설비는 『건축물의 에너지절약설계기준과 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정』을 준용하여 각 실의 용도별 기능에 적합하게 구분하여 에너지 절약적으로 설계하고, 유지보수인력절감 등의 종합적인 설비 운용이 되도록 설계하여야 한다.

2) 공조 조건별(부하 특성별, 사용 시간별, 방위별)로 Zoning을 계획하여 분할 제어할 수 있는 공조방식을 채택한다.

3) 실용도 및 사용 시간대를 고려하고 외주부 부하에 대응하며, 부분 부하에 충분히 대응할 수 있는 공조 Zoning을 계획하고, 에너지 절약 및 인력절감 등의 종합적인 설비 운용이 되도록 설계하여야 한다.

4) 공조조닝 계획을 수립한다.

가) 층별 제어가 가능한 공조기 설치.

나) 실내 온습도 조건이 타 구획과 크게 다른 곳.

다) 사용시간대가 타 구획과 크게 다른 곳.

라) 방위에 따른 일사 및 외벽 통과 부하 등이 타 구획과 크게 다른 곳.

마) 부하구성 중 감열비가 타 구획과 크게 다른 곳.

바) 내부 부하밀도 및 부하변동이 타 구획과 크게 다른 곳.

5) 기계실 등 각종 장비가 배치 된 실은 유지관리 및 장비 수선․교체 등이 문제가 없도록 공간을 계획하여야 한다.

6) 동해방지 대책, 결로 및 소음방지 대책과 실내 쾌적한 환경조성 등을 종합적으로 검토한다.

7) 공조실의 경우 차음 및 방진대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

8) 각종 기기실(전기, 통신실 등)은 장비의 기능유지와 보호할 수 있도록 설계하여야 하며, 단독으로 자립형 냉난방기가 설치되도록 계획 및 설계하여야 한다.

9) 에너지 절감 효과를 위하여  1HP 이상의 모터, 펌프 등에는 고효율 전동기 적용 제품으로 설계 반영하여야 한다.

10) 각 장비 및 기구에서 필요로 하는 유량과 열량을 각각 표시하여 본관과 지관에서 필요로 하는 최고 유량이 적정유속으로 통과할 수 있도록 각 배관별 계산서를 만들고 도면에는 배관경이 변하는 부분(분기되는 부분)마다 유량과 열량을 파악할 수 있도록 표시한다.

11) 모든 공급, 환수 배관에는 본관뿐만 아니라 지관까지 밸브를 부착하여 관말 지역의 냉난방 장비 및 기구까지 설계치의 유량을 공급시킬 수 있도록 한다.

12) 덕트(공조, 환기)는 열취득․손실, 결로발생 여부 등을 검토하여 보온여부를 결정하여야 한다.

라. 환기설비

1) 환기목적에 적합한 환기방식을 채택(실내 공기질 조건을 만족시키는 설비로 적용)한다.

2) 기능실의 용도를 고려한 환기계통을 분리한다.

3) 악취 냄새가 날 수 있는 기능실(주방, 식당, 화장실 등)은 부압상태를 유지한다.

4) 환기용 공기 취입구 및 배기구 설치는 오염원의 유입을 최소화 할 수 있도록 하고 외기 취입구와 배기구는 적절한 거리를 유지하여 오염원의 재진입을 방지한다.

5) 지상부에 설치하는 급,배기 그릴은 미관을 고려하여 배치한다.

6) 전열교환기 설치 시, 유지보수가 편리한 위치에 배치하여야 하며 주기적인 필터교체가 가능한 구조로 설치한다.

마. 중앙감시·자동제어설비

1) 각 설비의 자동제어 시스템 설계시 건축물의 특성에 접합한 시스템을 선정하여야 하며, 근무인원이 상시 상주하는 실(역무실 등)에 자동제어 중앙감시반을 설치하여 하며, 집중관리 및 종합적인 감시․제어가 가능하고 유지관리의 편의성과 에너지 절약 및 인력절감 등 종합적인 설비운용이 될 수 있고 장래 증축이 가능하도록 설계하여야 한다.

2) 자동제어반을 설치하여 운전과 감시가 가능하게 하여 유지관리의 편의성을 제공하고 에너지 절약 및 인력절감 등 종합적인 설비운용이 될 수 있도록 설계하되 운영자의 의견을 반영하여야 한다.

3) 자동제어반은 역 내 장비 및 터널 내 장비를 감시, 제어 및 이력관리(데이터화) 할 수 있도록 하여야 한다.

4) 제로에너지 건축물인증 대상인 경우에는 건물에너지관리시스템(BEMS) 혹은 원격검침설비(전기분야와 협의)를 설치하여야 한다.

바. 급수설비

1) 급수방식은 시수직결을 원칙으로 한다. 물탱크 설치 시, 생활용수와 소방용수를 분리할 수 있는 구조이면서, 일정한 급수압력으로 급수가 가능하도록 설계하여야 하며 공단 “철도설계지침 및 편람(건축편)”을 준용하여 설계하여야 한다. 단, 시수의 급수압이 낮을 경우 생활용수용 물탱크를 별도로 구축한다.

2) 소음 및 내압을 고려한 ZONING으로 계획한다.

3) 지하저수조 선정은 수질오염방지 및 내압강도 등을 고려하며, 내식성과 내압강도 면에서 우수한 재질로 하고 동파와 결로 방지를 위한 보온을 적용한다.

4) 각종 펌프의 토출 측에는 펌프 초기가동 시 급격한 수충격 해소를 위하여 충격방지장치를 적용한다.

5) 상수도 공급이 불가능한 경우에는 지하수 공급으로 계획하여야 하며 “지하수법”에 의하여 적법하게 설계하여야 하고 “먹는물관리법”에 의한 “먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙”의 먹는물 수질기준(별표1)에 적합하도록 수처리설비를 감안하여 설계하여야 한다.

6) 지하수를 공급할 때에는 지하수에 함유된 석회질 성분 등으로 인해 급수설비의 급격한 기능 상실이 발생하지 않도록 계획하여야 한다.

7) 물탱크실의 급수제어 시스템 고장 시 침수피해의 최소화를 위하여 배수설비와 상주자가 즉시 인지할 수 있는 설비를 계획하여야 한다.

8) 물탱크의 상부에서 추락으로 인해 안전사고가 발생할 우려가 있을 시, 산업안전보건법 등 안전 관련 규정에 따른 안전조치(안전난간 및 고정사다리 등)를 계획하여야 한다.

사. 급탕설비

소음 및 내압을 고려한 ZONING으로 계획하고, 개별과 중앙에서 공급하는 방식을 비교 검토하여 적합한 방식을 채택하여 설계토록 한다.

아. 위생기구 설비

1) 샤워실에는 근무인원 등을 고려하여 세면기, 샤워기, 양변기 등 위생기구 설치를 고려하고, 세면기와 샤워기, 급수전에는 에너지절약적인 방법으로 온수가 공급되도록 설계하여야 한다.

2) 국산 또는 국내에서 통상적으로 입수 가능한 제품 중에서 디자인, 기능, 절수 등에 뛰어난 제품을 선정토록 한다.

3) 소변기 플러시 밸브는 편리성과 절수에 배려한 자동형을 적용토록 한다.

4) 화장실, 식당 등의 온수는 개별과 중앙에서 공급하는 방식을 비교 검토하여 적합한 방식을 채택하여 설계토록 한다.

5) 각 화장실마다 별도의 급수, 급탕, 환탕 배관의 밸브를 부착한다.

6) 각종 펌프류는 예비품을 고려하고 자동 및 교번운전이 가능하도록 설계하여야 한다.

7) 옥외 오·배수관으로부터 건물내부로 취기역류가 없도록 이중트랩 적용한다.

8) 옥외에 설치되거나 외기에 노출되는 각종 배관은 동절기의 동파방지와 파손 피해가 없도록 설계하여야 한다.

9) 각 역사의 위생설비는 절수형으로 설치하고 필요시 생활용수를 재활용할 수 있도록 설계를 하여야 한다.

10) 화장실의 대ㆍ소변기 등 위생기구 설치는 『공중화장실 등에 관한 법률ㆍ시행령ㆍ시행규칙 』및『철도설계지침 및 편람(건축설비편)』을 준용하여 설계하여야 한다. 대변기는 서양식과 동양식 설치비율을 남자 9:1, 여자 8:2로 서양식 변기를 많이 설치하되, 소규모 화장실 등 설치장소의 여건에 따라 조정하여 설치할 수 있다.

11) 남자소변기+남자대변기 : 여자대변기의 비율은 1 : 1.5 또는 철도설계지침 및 편람(건축편)에 따르고, 남자/여자화장실에는 기저귀교환대를 설치하여야 한다.

자. 승강(편의) 설비

1) 승강설비(에스컬레이터, 엘리베이터 등)는 『교통약자의 이동편의 증진법․시행령․시행규칙』 및『승강기 안전관리법, 승강기 안전부품 안전기준, 승강기 안전기준, 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정』및 『철도설계지침 및 편람(건축편)』에 따라 관련법․기준에 의해 수송수요 등 현지여건 등을 감안하여 적정규모로 설계하여야 한다.

2) 장애인엘리베이터는 전동휠체어 이용자가 사용하기 편한 규모로 설치하여야 하며 자동 안내기능과 모든 층 및 카 내부에는 비상시 역무실과 통화할 수 있는 인터폰이 설치되어야 하며 층 선택 버튼은 취소기능이 반영되도록 설계하여야 한다.

3) 제어반 쇄정열쇠는 엘리베이터 개방키(삼각키)로 개방할 수 있는 구조로 설계하여야 한다.

4) 엘리베이터 카 내부에는 CCTV(IP타입)을 설치하여 역무실 통합감시반과 호환 가능하여야 한다.

차. 소화설비

1) 소방관련 법규 및 화재안전기준에 적법하게 설계하여야 하며 필히 관할 소방서의 의견을 조사 후 참조하여야 한다.

2) 화재 시 인간의 행동특성과 피난동선을 고려한 소화설비의 적정 배치한다.

3) 각 설비는 중앙감시반에서 조작, 감시 및 유도가 가능하도록 설계한다.

4) 가스계 소화설비는 한국소방산업기술원의 KFI 성능인증을 필한 소화약제 및 설계프로그램을 이용하여 계산해야 하고, 환경규제 대상 및 사람과 환경에 피해가 가장적은 소화약제를 비교·검토하며,『철도설계지침 및 편람(건축설비편)』을 준용하여 전기 관련기능실(전기실, 발전기실, 변전실, 축전지실, 통신기계실, 자동발매기실, 신호기계실 등)을 설계하여야 한다.

5) 물분무 등 소화설비 설계시에는 한국소방검정공사의 FI 인증을 필한 약제 및 프로그램을 사용하여야 하며 전기 관련 기능실(전기실, 축전지실, 통신기계실, 자동발매기실, 신호기계실 등)에는 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제설비로 설계하여야 한다.

6) 상시 사람이 거주하는 장소의 가스소화시설은 청정 소화약제의 종류를 비교 검토하여 선정한다.

7) 관련 법규에 따라 소방설비는 건축공사와 분리하여 발주할 수 있도록 도면, 시방서, 내역서 등을 별도로 분권하여 작성 및 제출하여야 한다.

카. 오·배수처리설비

1) 역사에서 발생되는 오수, 우수계통의 연결 배출 및 처리는 환경영향평가서 이행사항, 관련법규, 지자체 조례 등을 검토하여 지자체 및 발주기관과 업무구분 협의 후 설계하여야 한다. 단, 오수처리 여건이 환경영향평가서 이행사항과 상이한 경우에는 반드시 지자체와 협의(공문)를 근거로 설계하여야 한다.

2) 배수방식은 건물외부 하수처리관망계획 등에 따라 오수와 잡배수 2계통으로 구분할 수 있으며, 개인하수처리시설(오수처리시설, 정화조) 설치 시에는 환경영향평가서 이행사항 및 하수도법 등 관계법규를 준수하여 방류수질기준을 만족하고 관계기관과 협의하여 지자체 유의사항을 준수하여 설계하여야 한다.

3) 오수량 산출은 환경부 관련 고시(건축물의 용도별 오수발생량 및 단독정화조 처리대상인원 산정방법)에 의하여 산출하여야 한다.

4) 오수를 자체 처리하여 배출하고자하는 경우에는 “하수도법”에 의한 방류수 수질기준과 지자체 유의사항을 준수하여 설계하여야 한다.

5) 정화조 및 오수처리 시설을 설치할 경우 하수도법․령․시행규칙 등에 따른 적정 처리시설이 되고 관련법규와 규정․관계기관 의견에 적법하게 설계되어야 한다. 또한 급수/오수 산출 검토서를 사업책임기술자와 분야별책임기술자의 서명을 포함하여 설계설명서에 첨부하여야 한다.

6) 관계기관의 지침 등에 의해 설치가 필요한 경우에는 검토 보고서를 제출하여 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 한다.

타. 가스설비

1) 기계실 등 필요공간의 배치에 따른 용량 등을 검토하여 승인을 득한 후 설계에 반영하여야 한다.

2) 도시가스 공급여부, 정압기 필요여부, 인입관로 등을 관할 공급사에 반드시 문서로 확인 후 반영한다.

3) 정압설비 필요시 정압기실 위치를 건축과 협의 후 반영한다.

파. 신재생에너지설비

1) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에 따른 신·재생에너지 공급의무 비율을 충족시키기 위하여, 활용가능한 신에너지·재생에너지 등을 적용가능 하도록 설계하여야 한다.

2) 신·재생에너지의 설비의 설치에 필요한 제반서류 작성 및 인·허가 등 행정절차를 수급인의 부담으로 수행한다.

하. 기 타

1) 건축물 관리 및 용도에 필요한 모든 설비를 적절히 도입하여 향후 건물사용에 지장이 없도록 설계에 반영한다.

2) 에너지 절감에 대한 계획을 수립하고 유형별 방식에 대한 비교 검토서를 제출하여 승인 후 설계하여야 한다.

3) 건물 준공 후 원활한 시스템 운전을 위한 대한설비공학회의 기준에 따라 TAB을 실시할 수 있도록, 그 기준사항들은 설계에 반영, 제시되어야 한다.

- 시험·조정·평가(TAB)

(1) 시험ㆍ조정ㆍ평가(TAB)는 「국가건설기준(KDS)」,「대한설비공학회 시험조정평가(TAB) 기술기준」,「철도설계지침 및 편람」등에 의거 공조/환기, 제연설비, 급수, 자동제어설비 등에 대한 성능시험을 실시할 수 있도록 TAB 수행계획을 설계하여야 한다.

(2) TAB 수행내용에는 시스템검토, 예비보고서 작성, 현장측정 및 조정(풍속, 풍향, 풍압, 환기/제연풍량, 배수설비 등 측정 및 자동제어계통점검, 소음/진동 측정), 덕트기밀테스트, TAB 종합보고서 작성으로 구분하여야 한다.

4) 입상 P.D는 밸브 및 배관설비의 점검 및 보수가 가능토록 적정 면적을 확보하고, 적정위치에 점검구가 설치되도록 한다.

5) 동결 및 동파가 우려되는 모든 배관은 동파방지를 위해 방동보온 및 열선설치 등 완벽한 동파방지 조치를 하여야 한다.

6) 급수, 급탕, 가스 등의 계량기는 원격검침기능을 포함한다.

7) 실시설계 도서에는 본 건물과 관련한 모든 설비계획이 포함되어야 한다.

8) 유량계의 설치 : 급수, 급탕, 냉수, 냉각수 등 유량측정을 통해 에너지 사용량의 측정이 필요한 부분에는 초음파 유량계 동등 이상의 유량측정 장치를 설치한다.

9) 공조, 냉․난방, 환기, 위생 등 공종별로 에너지사용량, 물 사용량 등이 축적되어 향후 유지관리, 설계 등에 활용될 수 있도록 계획하여야 한다.

10) 설계설명서에는 설비의 계획에 관한 사항과 SYSTEM 운영 및 유지관리와 각종 장비의 용량산출서 등 설비와 관련된 사항이 포함되어야 한다.

5. 전기/통신설비 및 전기소방 분야

5.1. 일반사항

가. 전기 및 통신 설계는 에너지 절약적인 시스템 채택, 관리의 효율화, 기기의 호환성, 환경오염 방지, 쾌적한 실내환경 조성, 안전성, 신뢰성, 기능성, 경제성 등을 고려한 설계가 되어야 한다.

나. 사고파급으로 인한 피해를 최소화 할 수 있는 방안과 안전하고 편리한 유지보수와 장래확장 및 증설에 대한 대책을 수립하여야 한다.

다. 기존 시설(전기실, 통신실 등)의 이설이 필요한 경우 장비 등을 현장 실사하여 증축되는 건물로 안전하게 이설될 수 있도록 관할 지역본부와 협의하여 계획하여야 한다.

라. 장비교체 및 증설을 위한 장비 반입대책이 고려되어야 한다.

마. 소방전기 설비는 건축적 방화계획과 기계설비의 소화계획 및 전기의 방재계획이 유기적으로 감지, 제어될 수 있는 시스템으로 계획되어야 한다.

바. 통신설비는 급변하는 정보화 시대에 능동적으로 대처할 수 있는 통신 시스템을 도입하여 양질의 통신서비스를 제공할 수 있도록 계획하여야 한다.

사. 건축계획 시 전기설비계획에 대하여 사업책임기술자와 충분히 협의하여야한다.

아. 주요시스템 계획 시는 경제성, 장단점 비교 및 기타사항을 고려한 설계방안을 연구, 검토하고 그 결과에 따라 중간설계에 임하여야 하며, 모든 시스템의 비교 분석은 공정하고 타당성이 있어야 하고 주관적이어서는 안 된다.

자. 건축물의 설비 기준 등에 관한규칙 및 에너지이용합리화법에 의하여 에너지 이용 등에 있어서 관계기관과 협의하여 그 효율을 극대화 할 수 있는 시스템으로 설계하여야 하며, 에너지 효율의 극대화로 투자비 절감을 할 수 있도록 경제적 타당성을 비교 분석하여야 한다.

차. 전력손실의 최소화를 고려한 에너지 절약시스템으로서 고효율 에너지 기자재 설비를 적용한 경제적인 시스템으로 계획하여야 한다.

카. 설계기준에 대하여 기술적이나 기능적으로(신기술, 신공법, 신자재 적용 및 지시사항 등) 동등 이상의 대안이 있을 경우에는 대안에 대한 자료를 검토 후 설계에 적용한다.

타. 품질향상을 위하여 정부기관에서 성능인증을 거친 제품을 우선 선택하며, 관련 법규 및 제반 규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

파. 향후 설비 증설에 대비하고, 기기의 성능이 우수하며 신뢰도와 유지보수 및 관리의 효율성을 고려하여야 한다.

하. 굴착작업이 수반되는 공사의 설계 시에는 지하매설물의 안전관리에 관한 사항을 충분히 반영하여야 한다.

거. 대외기관(기간통신사업자, 지자체 등)과 협조가 필요한 부분은 성실히 이행하여야 하며, 충분한 협의를 거쳐 설계하여야 한다.

5.2. 세부지침

가. 전기실설비

1) 전기실 부하용량과 장례증설 및 유지보수를 고려하여 면적산출 및 기기배치를 구성하여야 한다.

2) 전기실은 2개 전원(NO.1, NO.2)을 공급받아 부하설비에 전원공급이 가능하도록 하여야 하며, 예비전원으로 자동절체 될 수 있도록 설계에 반영하여야 한다.

3) 변압기는 환경 친화적이고 에너지 효율이 높은 고효율 변압기 설비를 반영하여야 한다.

4) 변압기 뱅크 구성은 주·예비별 전등․전열용 변압기, 동력용 변압기, 전산용 변압기, 통신용 변압기로 구성한다.

5) 저압반 구성은 사고 시 절환 공급이 가능하도록 TIE ACB 계통으로 구성하여야 한다.

6) 전기실 덕트 및 핏트, 트랜치내 케이블 등에 대한 방화대책을 강구하여야 한다.

7) 전기실 고압 배전설비 등은 사고정보나 정상정보를 실시간으로 구로통합 SCADA사령실과 관할 전기사업소에서 원격제어 및 감시가 가능하도록 구성하여야 한다.

8) 디지털 통신(CU)장치는 디지털 배전반과 연동하여 전력급전계통의 다양한 정보를 SCADA사령설비 및 소규모제어 장치와 통신할 수 있도록 구성하여야 한다.

9) 예비전원설비는 관련법(소방법 등)을 만족하는 설비를 하여야 하고, 예비전원이 필요한 전력부하 설비를 구분하여 설계하여야 한다.

10) 접지설비는 개별접지(매쉬접지 또는 구조체 접지)를 시행하고 공용접지선(매설접지)와 연계하여야 한다.

11) 수․배전계통의 보호계전기 정정 계산을 하여 설계에 반영하여야 한다.

12) 지진시에 전도, 이동, 탈락등이 발생하지 않도록 바닥, 벽 등에 단단히 고정 하도록 배전반과 변압기등 전기실 설비(건축전기설비)에 대하여 내진 설계를 하거나, 내진 또는 면진 성능인증을 획득한 제품으로 설계에 반영하여야 한다.

나. 동력설비

1) 동력설비는 각 기계실 동력부하에 전원을 공급하고 집중 제어할 수 있도록 제어반(MCC)을 설치, 기기의 시험운전과 정상시의 안전을 고려하여 분기회로의 거리를 최소로 설치한다.

2) 전자식 과전류계전기는 전동기의 과부하보호, 지락검출, 공회전 방지가 가능한 기기로 계획하여야 한다. 다만, 소방용 펌프 등 기타 특수한 용도는 계측, 감시 및 경보기능만 갖도록 구성하여 차단되지 않도록 한다.

3) 전산 동력용 동력 제어반은 24시간 운영체제 시스템 또는 정전시간이 최소가 되도록 계획한다.

다. 조명설비

1) 심리적, 생리적 피로를 감소시킬 수 있는 조명, 눈부심이 없는 조명기구를 설치하여 쾌적한 환경을 확보, VDT 증후군 방지를 위한 조명환경을 조성한다.

2) 조명설비 배관 및 배선은 사무실 칸막이 변경 시 대응이 용이하고 가변 기능이 있는 자재를 검토하여, 시공의 용이성과 칸막이의 변경에 효율적으로 대처할 수 있도록 하여야 한다.

3) 조명기구는 절전형, 고효율 제품을 사용하며 실내 디자인과 조화를 이룰 수 있는 조명기구를 선정하고 에너지 소비효율 2등급 이상의 기구를 사용하여야 한다.

4) 조명기구의 모델 및 회로구성 계획은 조명제어 시스템 적용에 적합하게 계획하여야 한다.

5) 공용부(복도, 계단, 화장실 등) 조명은 에너지 절감을 위해 자동으로 감광 또는 부분점멸이 가능하게 계획하여야 한다.

6) 화장실 내 대변기 위 조명은 칸막이 도어에 부착된 개폐 센서에 의하여 점멸이 가능하도록 계획하여야 한다.

7) 5m이상 고소등 설계시는 유지보수성을 고려하여 감독자와 협의하여 승하강 방식 조명설치를 검토하여야 한다.

8) EPS, TPS실 및 설비용 P.S실 등에는 별도의 조명기구 및 콘센트를 설치하며, 전원연결은 유지보수 및 점멸을 원활하게하기 위하여 전 층 모두 분기 1회로(수직배관)로 공급을 계획하여야 한다.

9) 피트 내부, 유수검지장치실, 파이프 샤프트 등에는 적절한 조도로 계획하여야 한다.

10) 기타 역사 운용에 필요한 모든 조명설비를 설계하여야 한다.

라. 옥외등 설비(필요시)

1) 건물 이미지 및 주변 현황에 적합한 옥외등 설비를 계획한다.

2) 시간대별 계절별로 회로를 분리하고 절전성능이 우수한 조명등을 계획하여야 한다.

3) 특히 유지보수의 편리성을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

마. 경관조명설비

1) 건물 외관 디자인과 연계하여 경관조명설비를 계획한다.

2) 환경친화적 조명 및 테마에 맞도록 계획하고 투시도 등을 통한 야간 경관 조명 시뮬레이션을 실시 후 설계에 반영한다.

3) 특히 유지보수의 편리성을 고려하여 설계에 반영하여야 한다.

바. 전열설비

1) 동력 및 전열설비의 종류, 전원공급, 보호, 용량, 기동특성 등을 고려하여 그에 요하는 배선설비를 계획한다.

2) 고정과 이동형 전기기기를 사용할 때 불편함이 없도록 적정위치에 콘센트를 배치하고, 습기가 많은 장소에 설치되는 콘센트는 방습형으로 계획한다.

3) 정보통신 배선과의 간섭이 생기지 않도록 계획한다.

4) 콘센트 1회로에 7개 이하로 구성하며 1KW 이상의 전열기기는 단독회로로 구성을 계획한다.

5) 건축 모듈에 맞게 수구를 설치하고, 시스템박스 설치시 위치는 통합배선과 연계하여 계획하여야 한다.

6) 습기가 있는 장소의 화장실, 탕비실 등은 별도 회로로 구성하여 정격 감도전류 15mA이하의 누전차단기를 반영 하여야 한다.

7) 기계설비에서 소변기, 세면기를 전기식으로 설계할 경우 전원을 공급하여야 한다.

8) 대기전력차단장치는 「건축물의 에너지 절약 설계 기준」에 의하여 설계에 반영하여야 한다.

사. 전차선로 이설(필요시 별도시행)

1) 철거되는 부산물(고철류, 동 등)에 대한 오차가 없도록 설계하며, 철거발생품의 무게를 계근하여 지정된 장소로 반납되도록 하고, 건설폐기물은 폐기물관리법에 의거 합법적으로 처리하는 것으로 설계에 반영하여야 한다.

2) 신설되는 철주의 지지물 및 기초등에 대한 구조물 안정성(휨하중, 인장하중등) 검토하여 그 결과를 제출하여야 한다.

3) 급전선 및 보호선은 전주대용물을 이용하여 선별로 분리 빔상부에 설치 시행하여야 한다.

4) 본 사업은 인접 사업구간과 연계하는 전철설비를 감안하여 가장 합리적인 전차선로 구성이 되도록 시스템을 선정하여야 하며 시공 시 설계변경이 발생하지 않도록 세부 공정이 누락되지 않도록 하여야 한다.

아. 피뢰 및 접지설비

1) 모든 통신설비에 대하여는 낙뢰 및 기타유도에 영향을 받지 않도록 관련 법규에 적합한 피뢰(KS C IEC 61024) 및 접지설비 또는 보호설비를 계획한다.

2) 접지방식의 형태, 설비별 접지방법, 접지설비에 관한 국내외 규정 및 설비기준, 외국 설치사례 등 접지설비의 기능성 및 신뢰성이 확보되어야 한다.

3) 뇌격으로부터 건물, 인명 및 각종장비를 보호하기 위해 뇌격전류를 신속하고 안전하게 방류시켜 완전 보호될 수 있는 방식으로 계획한다.

4) 접지설비는 관련법규 및 기준에 따라 기존의 접지상태를 파악하여 최적의 설비가 되도록 계획한다.

자. 자동제어 설비

1) 각 설비의 자동제어 시스템 설계시 건축물의 특성에 접합한 시스템을 선정하여야 하며, 근무인원이 상시 상주하는 실(역무실 등)에 자동제어 중앙감시반을 설치하여 하며, 집중관리 및 종합적인 감시․제어가 가능하고 유지관리의 편의성과 에너지 절약 및 인력절감 등 종합적인 설비운용이 될 수 있고 장래 증축성 있도록 설계하여야 한다.

2) 자동제어반을 설치하여 운전과 감시가 가능하게 하여 유지관리의 편의성을 제공하고 에너지 절약 및 인력절감 등 종합적인 설비운용이 될 수 있도록 설계하되 운영자의 의견을 반영하여야 한다.

3) 자동제어반은 역 내 장비 및 터널 내 장비를 감시, 제어할 수 있도록 하여야 한다.

차. 조명제어 설비

1) 콘코스, 대합실, 역무실, 복도, 옥외등, 경관조명 등 용도에 적합하게 용도에 적합하게 조명제어 설비를 계획한다.

2) 기능적으로 적절한 조도 및 광원의 균일한 배열에 의한 효율 수명에 주안하여 절전형으로 설치하되, 적정 조도가 이루어질 수 있도록 한다.

카. 원격검침설비

- 과금 및 관리를 위하여 각 계열사별 전산장비, 층 Zone별로 전력 및 냉난방 사용량을 계량할 수 있도록 원격검침설비를 계획한다.

타. 통신관로

1) 통신관로 구성 시 선로거리가 최단거리이며, 건설 및 유지보수가 편리한 경로로 선정하여야 한다.

2) 통신관로 구성 시 재해의 위험이나 전력유도 및 유해물질 등의 영향이 적은 위치로 선정하여야 한다.

3) 도로 점용, 선상 하부 등에 관해서 미리 관련부처에 의견을 타진하여 설계에 반영하도록 한다.

4) 통신관로를 건설할 때는 건축한계에 접촉하지 않는 개소 및 위험개소는 피하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 통신관로는 향후 증설이 용이하도록 설계에 반영하여야 한다.

6) 통신관로는 선로 양측으로 인입관로, 인입관로에서 통신실까지 이원화하여 설계에 반영하여야 한다.

7) 통신관로는 역사 및 각 기기실(통신, 전력, 신호)에 연결되는 인입관로와 본선구간의 상ㆍ하행선 노반양측에 설치되는 공동관로 또는 매설관로로 구성한다.

파. 통신케이블

1) 통신케이블은 기본 및 향후 증설에 따른 계획을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 통신케이블 설계시 맨홀 및 관로내의 수분, 허용 포설 장력, 허용 구부림 반경 등을 충분히 검토하여 설계한다.

3) 토목구조 및 관로시설에 따라 통신케이블의 유지보수 및 기술상 문제점을 다음과 같이 고려하여 설계에 반영한다.

4) 통신케이블 접속은 관로 내에선 원칙으로 불가하도록 설계한다.

5) 통신 회선 및 통신사 이중화 구성을 고려하고, 케이블 관리시스템(CMS) 구축을 설계에 반영하여야 한다.

6) 광케이블은 이원화 구성이 되도록 하여야 하며, 외부 설치류에 의한 케이블 보호가 되도록 강대외장 광케이블로 설계에 반영하여야 한다.

하. 통합배선설비

1) 각 실에 대하여 용도에 적합한 통신설비를 구축하되, 향후 정보통신설비의 증설을 예상하여 충분한 면적을 확보하도록 한다.

2) 국선인입에 필요한 배관·배선 및 기타 부대장치의 설치로서 공중통신사업자의 구조물(인·수공)로부터 인입부지 내 구조물의 설치를 포함하는 국선단자함까지 인입되는 설비를 검토하여 설계하여야 한다.

거. 주 전송설비

1) 종합사령실 및 역사 전송망 구성을 검토 및 반영

2) 기존 전송망 구성방식을 검토하여 최적의 전송시스템이 되도록 검토 및 반영

3) 통신기계실 배선반, 광 분배함 설치를 검토 및 반영

4) 망 관리 시스템과 연동 및 증설을 검토 및 반영

너.  운영관리를 위한 통신설비

1) 전화설비

가) 전화설비는 통합배선 시스템으로 구성하여야 한다.

나) 역무실 등에는 적정수량의 전화기를 설치하여야 한다.

다) 상호 연락이 가능하도록 전화회선 및 전화기를 확보하도록 한다.

2) TV 공시청설비

최적의 양호한 방송을 수신 받을 수 있도록 검토 및 반영

3) 무정전 전원설비

가) 설치개소별 전원 용량 검토 및 반영

나) 장비 신증설에 따른 전원설비의 구성 방안 검토 및 반영

4) 방송설비

가) 전관방송설비는 동시 및 그룹별 방송이 가능하여야 하며, 비상시 화재수신반과 연동하여 비상방송이 가능하여야 한다.

나) 전관방송설비는 다원화 방송이 가능한 시스템을 구축하여야 하며, 방송 상태를 점검할 수 있는 모니터링설비를 설치한다.

다) 각 실에는 독립된 음향장치 설치하도록 한다.

5) 정보통신망(네트워크)설비

가) 역사 내 운영 및 유지보수 업무를 위해 내부 데이터망(LAN) 시스템의 구성내역을 충분히 사전 파악하여야 한다.

나) 철도공사에서 기 운용중인 철도 전산망과의 호환성을 확보하여야 하며, 장비 신설 및 이설의 경우 향후 유지보수가 편한 구성을 택해야 한다. 이를 위해 구성 및 규격에 관련하여 IT운영센터와 협의하여야 한다.

다) 네트워크 장비를 설치 및 유지보수하기 위한 충분한 상면공간을 확보하여야 한다.

* 충분한 상면 공간이란 일반 역 기준 Rack 설치를 위한 바닥면적 600*1000(mm) * 1(식) 포함 장비 온도 유지를 위한 타 장비와의 이격 공간을 포함한다.

라) 다음 내용을 설계시에 고려하여야 한다.

(1) 기설 네트워크 장비의 내용연수가 지난 경우 신설 장비로 교체 구성(네트워크 장비를 실장하기 위한 Rack 포함)하여야 하며, 기설 장비와 동급의 성능 및 용량 이상의 장비로 구성하여야 한다.

(2) 주요 네트워크 장비(L3스위치 이상)는 장비 및 전원 이중화를 기본으로 설계해야 하며, 그 외의 장비 또한 이중화 구성을 우선적으로 고려하여야 한다.

(3) 네트워크 L3스위치 및 라우터는 보안기능확인서를 득한 제품으로 납품하여야 하며, 해당 인증서를 제출하여야 한다.

(4) 철거 발생품은 감독자가 지정하는 장소에 반납하여야 한다.

(5) 네트워크 증속 관련 기본 통신노드～역사 단위간 광케이블 포설 및 과부하 트래픽 고려하여 10Mbps 이상 확보

* 거점노드와 통신노드는 100Mbps 이상 증속 고려하여 시설하여야 한다.

(6) 역 전산실 및 통신기계실 내 네트워크 랙(Rack) 장비 배치를 하여 충분한 기계실 공간을 비교 검토 후 반영

(7) 해당 네트워크 장비는 HW 및 SW License 전체를 납품하여야 한다.

더. CCTV 설비

1) 역사 승강장, 맞이방, 광장, 무인기능실 등 건물의 모든 부위를 감시할 수 있도록 CCTV(지능형) 설비를 계획한다.

2) 전기실, 통신기기실, 신호기계실에는 출입감시가 가능하도록 카메라를 설치하고 관할 전기사업소에서 감시할 수 있도록 시설하여야 한다.

3) 감시 카메라 설치위치는 사각지대 없이 감시대상을 충분히 감시할 수 있는 적당한 위치에 계획한다.

4) 조도, 원격감시 등에 따라 카메라 조정방안(Zoom, Pan/TILT)을 고려하여야 한다.

5) 카메라(IP)는 200만 화소 이상 디지털 방식으로 계획한다.

6) 녹화방식은 해상도가 좋고 유지관리가 편리한 디지털방식(NVR SYSTEM 이상)을 사용하여 녹화 및 재생을 통한 24시간 감시가 가능하도록 한다.

7) 운용자의 필요에 따라 영상의 선택 및 녹화가 가능하여야 한다. 필요시 철도교통관제센터에서도 감시가 가능하여야 한다.

8) 카메라는 영상 감시목적에 적합한 개소에 설치하며, 조도, 원격감시 등에 따라 카메라 조정방안(Zoom, Pan/TILT)을 고려하여야 한다.

9) 저장장치의 용량은 7일 이상이 되도록 계획하며, 추후 카메라 증설 시 저장장치 추가가 편리하도록 계획한다.

10) 3.5m 이상 높은 장소에 카메라 설계시 유지보수성을 고려하여 감독자와 협의 후 승하강식 카메라를 검토하여야 한다.

11) 영상감시장치의 시각이 일정하게 유지되도록 시각동기화 서버를 계획한다.

러.  열차운전을 위한 통신설비

1) 영상전송설비

가) 종합사령실 및 관리역 영상 감시장치의 증설을 검토 및 반영

나) 역무실에서 승객 감시가 가능토록 모니터와 제어장치 설치를 검토 및 반영

다) 감시범위는 승강장 상황, 대합실, 주요기능실, 주요시설물, 에스컬레이터, 엘리베이터, 기타 주요장소에 카메라 설치를 검토 및 반영

라) 화재감지설비와 연동을 검토 및 반영

마) 본선 및 본선 환기실을 감시 가능토록 검토 및 반영

2) 열차무선설비

가) 재난안전 무선통신망과의 연계 검토

나) 타 열차무선통신망과의 전파간섭 해결방안 검토 및 반영

다) 기존 열차무선통신망(VHF)과 연동 검토(LTE-R 구축 선진사례 조사 등)

라) 휴대국 및 기타 무선설비 검토 및 반영

3) 전화설비

가) 종합사령실과 통화할 수 있는 전화기 반영

머.  여객서비스를 위한 통신설비

1) 방송설비

가) 역무실에서 승객안내 및 각종 공지사항 전달이 가능토록 검토 및 반영

나) 종합사령실에서 원격방송 및 제어가 가능하도록 검토 및 반영

다) 열차 진출입시 자동으로 안내방송이 가능하도록 검토 및 반영

2) 여객안내설비

가) 각 역사 승강장에 접근상태, 행선지안내, 공지사항 및 기타 그래픽 표출이 가능토록 검토 및 반영

나) 열차 정보를 받아서 기타설비에 제공할 수 있도록 검토 및 반영

3) 승강장 비상통화 장치

승객이 비상시 역사내에 비상전화를 이용하여 역무실과 통화할 수 있도록 검토 및 반영

4) 무선방송설비(LTE-R 구축시)

열차무선 휴대국을 이용하여 역사내 무선방송이 가능하도록 검토 및 반영

5) 시각장애인용 음성유도기

가) 역사내에서 시각장애인들에게 편의를 제공할 수 있도록 관련 설비를 검토 및 반영

나) 음성유도기 설치장소, 안내멘트 등을 검토 및 반영

버. 본선통신설비

1) 광섬유 케이블

가) 주전송용, 영상전송용, 경영정보(LAN)용, 예비 및 기타용도 코어수, 규격 등 검토 및 반영

나) 궤도횡단 및 역사 케이블 인입방안 검토 및 반영

다) 망 이중화 방안 검토 및 반영

2) 동 케이블

규격, 물량 등 검토 및 반영

3) 본선 내 공중선(무선안테나 및 방사형동축케이블)

가) 열차무선용 공중선 규격 및 설치방법 검토 및 반영

나) 복합무선통신용 공중선 규격 및 설치방법 검토 및 반영

다) 급전선 및 분배기 규격 및 설치방법 검토 및 반영

서. 역무자동화설비(광역역사)

1) 역무설비(통합자동발매기, 발권기, 자동개․집표기, 승차권분류기, 역단위감시시스템 등)의 수량은 수송수요를 참조하여 첨두시 승․하차 인원을 적용 하여야 한다.

2) 각종 단말장치는 기 운영중인 중앙전산기, 호선별전산기, 운영자전산기, 유지보수전산기와 호환되도록 구성하여야 한다.

3) 역무설비 설치위치, 방법 등은 승객동선을 고려하여 승객의 편의 및 안전을 최우선으로 설치도록 검토하여야 한다.

4) 설비의 자동화를 통한 역무인력을 절감할 수 있는 방안을 검토하여야 한다.

5) 기 운영중인 노선과의 연계성을 검토하여야 한다.

6) 설비의 유지보수에 편리성을 검토하여야 한다.

7) 단말기간, 단말기와 사령실간 원활한 데이터 전송을 위한 인터페이스가 될 수 있도록 계획하여야 한다.

8) 현재 운영중인 시스템의 원활한 운용을 위한 통신수요를 파악․검토하여야 한다.

9) 역단위전산기, 중앙전산기와 요금정산을 위한 프로그램 검토 및 기 운영중인 설비와 연계방안을 제시하여야 한다.

10) 주전산시스템, 단말장비 및 승차권 종별 운영방안을 검토하여야 한다.

11) 도시철도 및 버스 환승 시 호환성이 유지되도록 검토하여야 한다.

12) 자동개․집표기(장애인용 포함) 설치, 화재수신반과 연계 검토

13) 통합자동발매기, 역단위감시시스템, 승차권분류기 설치

14) 모든 종류의 승차권 발급, 정산, 판독할 수 있도록 발권기 설치

15) 역무설비 운영 자료를 출력 및 검토를 위한 설비를 계획하여야 한다.

16) 장비설치에 필요한 배관 및 배선 설치위치, 시공방법 등을 검토하여야 한다.

17) 타 설비(건축, 소방, 전기 등)를 고려하여 설계하여야 한다.

18) 본 과업에 적용되는 승객수요를 고려한 승차권수량을 제시하여야 한다.

19) 정상운영 및 유지보수에 상용될 예비품을 제시하여야 한다.

어. 역사 구내통신설비

1) 역사내의 구내통신설비(배관, 케이블 등)를 비교검토 후 반영

2) 구내통신회선은 최신규격과 충분한 예비율을 비교검토 후 반영

3) 화재 등을 고려 안전성을 비교검토 후 반영

4) 통신기계실내 장비배치를 하여 충분한 기계실 공간을 비교검토 후 반영

저.  기타사항

1) 타분야 및 설비간 연동사항을 검토 및 반영

2) 설비별 추진공정표를 검토 및 반영

3) 통신실, 역무통신실 통신설비 신증설을 검토 및 반영

4) 설비별 시스템 구성에 필요한 사항 검토 및 반영

5) 기타 발주기관이 요구하는 사항에 대해 검토 및 반영

처. 소방 전기설비

1) 전기소방․전기(전력)등은 관련 법령, 조례, 지침, 기준 등에 위배 없이 설계하여야 한다.

2) 종합방재센터는 비상시 모든 운영체계를 일원화하고 운영의 효율을 극대화하며 재해발생시 소화 및 피난 등을 총괄 지휘할 수 있는 시스템으로 구성토록 계획한다.

3) 방화구역으로 지정된 출입문은 화재시 소방 설비와 연동하여 수동으로 개폐 가능하도록 계획한다.

커. 전기소방은 점검보수가 용이한 공간을 확보하여 조인트 박스 설치, 단자함 등에는 단자 명세서 비치 또는 단자대에 명기, 간선은 스페어선을 2가닥 정도 추가하여 계획한다.

6. 조경분야

가. 조경 계획

1) 역 광장은 철도이용객의 역사 접근성과 편리성이 우선되도록 계획하되, 필요에 따라 파고라 등 여객 및 지역주민이 휴식할 수 있는 공간을 검토하여 계획 한다.

2) 실내·외 조경계획 시 도시 공해와 기상 변화에 강한 식재 등 생육적응성이 높은 식물 종을 선정하여, 미세먼지와 하절기 폭염 등에 대처한다. 토심과 생육 환경, 색상 및 높이를 고려하며, 다층 식재 계획을 수립한다.

3) 법정 조경면적(식재부분의 면적과 조경시설공간의 면적을 합한 면적)이상으로 계획 한다.

4) 열차운행에 지장을 주는 조경 수목 또는 철도시설물에 훼손의 우려가 있는 조경 수목을 식재하여서는 안된다.

5) 조경 포장은 원활한 통행, 미적 분위기 조성 등 기능성과 실용성을 고려하여 투수성 포장구조로 설계 한다.

나. 광장계획

1) 광장 포장시에는 우배수 처리계획을 수립한다.

2) 광장 및 주차장의 포장 보조기층재료는 경제성 등을 검토하여 순환골재 사용을 설계에 반영할 수 있다.

3) 주차장 및 광장은 가급적 환경친화적으로 설계 한다.

다. 조경설계는 조경전문가가 설계하여야 하고 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의하여 건설부문 중 [조경] 분야의 엔지니어링사업자로 신고를 필한 업체 또는 「기술사법」 제6조 규정에 의하여 건설부문 중 [조경]분야의 기술사사무소를 개설 등록한 업체의 승인을 득하여야 한다.

Ⅳ. 설계도서 작성

1. 설계도서 작성요령

1.1. 공통사항

가. 설계도서는 국토교통부 제정 ‘건축물의 설계도서 작성기준’, ‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준’에 따른 계획․중간․실시설계의 도서작성 기준 및 한국철도공사 ‘공사 및 용역관리규정’ 등에 의거 작성한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

다. 설계도서(시방서)에 다음의 내용을 명시하여야 한다.

「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」의 [별표13] ‘내진능력산정기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개하여야 한다.

1.2 계획설계

가. 정의

“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 수급인은 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 계획설계(안) 작성 시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 측량성과도 (필요시 : 대가 발주기관 별도 지급)

9) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항

라. 현장조사 방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사 및 지장물 조사

- 시설물의 설계 및 시공에 영향을 미치는 각종 지하매설물과 지상시설물 및 장애물을 조사하여야 한다.

- 대지의 지상(철거대상물 포함)과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음ㆍ진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영·보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당 기관과 협의하여 적절한 보호 방안을 수립하여 공사 중에 손상이 없도록 한다.

사업에 저촉되는 지상 및 지하지장물을 관계기관과 협의, 이설 및 보상이 가능하도록 상세히 조사하여야 하며, 자료 작성에 성실히 협조하여야 한다.

- 송유관, 광케이블, 철탑, 공공시설물, 분묘, 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.(관계기관 확인자료 포함) 조사된 지장물은 현황도에 정확히 표기하여야 한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사 보고서로 작성․제시하여야 하며, 최종보고서에 첨부하여야 한다.

마. 측량조사방법

1) 시행방법: 측량은 측량법령 및 공공측량의 작업규정에 관한 기준에 따라 시행하여야 하며, 기본설계에서 과업에 필요한 모든 측량을 수행한다.

2) 측량작업계획서의 작성: 수급인은 측량을 실시하기 전에 측량 작업계획서를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 하며 계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가) 조사측량

나) 작업계획서(외업, 내업)

다) 인원편성

라) 측량실시시기

마) 주요기기

바) 특기사항

사) 위치도 등 기타 필요한 사항

3) 측량기구의 점검 및 보정: 측량 기구는 각 조사에 적정한 것을 사용하여야 하며 사용 시에는 점검 및 보정을 하여야 한다

가) 철도지역 내 측량 시 특고압선에 의한 감전우려가 있어 2.0m이상의 측량 스타프(함척) 사용금지(사람높이 이상으로 들지 않는다.).

4) 안전관리: 수급인은 측량작업 시 6. 안전대책에 따라 안전사고 방지에 유의하여야 하고, 안전사고 발생에 따른 모든 책임은 수급인 진다.

5) 관계기관의 제 수속 절차: 관계기관의 제 수속은 수급인의 부담으로 신속히 처리한다.

6) 성과품 제출: 성과품(원도, 작업일지, 야장)은 용역준공 납품 시 발주기관에 제출하여야 한다.

7) 기준점: 각종 기준점은 가능한 변형이나 침하가 발생하지 않는 고정점으로 선정하고, 필요 시 인조점을 두며 인조점은 기준점 1개소당 3개 이상, 변형되지 않도록 설치하여 항상 기준점에 대한 확인이 가능하도록 하여야한다.

8) 일반사항

가) 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

나) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독관과 협의 후 현지측량에 임해야 한다.

다) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

라) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

마) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

바) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산할 수 있다.

사) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

아) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

자) 지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

차) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10% 이상 여유있게 측량해야 한다.

9) 조사측량

가) 현황측량(평판측량)은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

- 축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 과업면적의 10% 이상 여유로 측량하여야 한다.

나) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주기관과 협의 후 결정한다.

다) 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

라) 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

마) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시하여야 한다.

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

바) 각종조사 및 계산

- 지적의 복제

· 기 조사된 지적도와 현황측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

- 계산

· 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의하여 실시한다.

10) 표시항목

- 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

11) 기타사항

가) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

나) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산한다.

다) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

라) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독관의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

1.3. 중간설계

가. 정의

“중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 계획설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 지질조사 결과보고서를 토대로 지반 및 구조검토를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 사업면적, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 현지조사사항 : 국내외의 유사한 규모의 사례를 조사한 결과와 성공 및 실패 사례를 조사, 분석, 검토한 내용

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사 시 조사내용 표기

- 공사비 산정 : 공종별 내역서가 첨부되어야 공사비관리(Cost Planning)가 가능함

- 주요공법, 장비, 자재선정 보고서 : 대안제시, 선정사유, 예산비교 등 포함

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획 : 골조의 평면, 간 사이(Span), 층고, 바닥판 구조 등

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

다) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해공사에 필요한 특기사항

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담장, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부속시설의 위치 기타 필요한 사항

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치

- 대지구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감 표 : 바닥, 내벽, 천장, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도 : 각실 크기, 용도, 벽 위치, 재료, 두께 등 실시설계 기준이 되는 사항 (축척 : 1/200정도)

- 입면도(정면 및 측면) : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 단면도(종횡 2면 이상) : 건축물의 구조를 파악하기 좋은 위치에서 종횡 2면 이상 절단하여 단면도를 표시

- 계단 평․단면상세도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 각층 창호 평․입면도 : 실시설계의 기준이 되는 사항

- 주요 구조부 단면상세도

- 기타 실시설계에 기준이 되는 필요한 도면

마) 조감도(투시도) : 천연색채 사용

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 공사금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수 등

- 시공방법

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 구조 및 수리계산서

- 구조계산서 (옹벽, 가시설)

- 수리계산서

- 절(터파기)⋅성토 사면안정성검토서

다) 지질조사보고서 : 토질의 개황, 토질조사, 토질시험결과 등 지질조사 방법에 따른 성과물(필요시 : 대가 발주기관 별도 지급)

라) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

마) 도면종류

- 위치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 구조물도 및 부대시설도

- 유역산출 면적 표(반드시 배수와 연계되어야 함) 기타

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 조경면적 산출표, 공사금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상 하수 등

- 개략공사비 산정

- 기타 필요한 사항

나) 개략 설계내역서 : 개략 내역서, 개략 수량산출근거 기타 산출근거

다) 도면종류

- 위치도

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수 평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 설비 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서(시스템별 기능, 특징, 소요예산 등 비교․검토 후 결정)

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서(유사 건물 비교)

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 상․하수도의 연결 관계, 수조, 위험물저장소, 각종탱크, 정화조, 기계실 위치 등

- 계통도 : 공조, 위생, 열원 및 냉난방, 급수급탕, 오배수 통기 및 우수배수, 오수정화 및 물재이용, 자동제어설비 등

- 평면도 : 기계실 평면도, 특수층의 설비평면도, 냉․난방배관, 공조 덕트, 위생배관 평면도, 자동제어설비 평면도 등

- 단면도 : 기계실 기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 사항

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도

- 정화조는 각종 법률을 검토 후 부패조, 단독정화조 위치표기

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 전기

가) 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항

- 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 부하계산서(설계 시 산출근거 제출)

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K. S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 전력, 통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외 간선 평면도, 전력의 수전지점, 수전경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 수변전설비도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전력, 방재, 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 전등, 전열, 동력, 방재설비, 기타 필요설비의 배치도

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 정보통신(역무자동화설비, 열차행선안내설비, 음성유도기 설비 포함)

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신선로, 전송설비, 열차무선, 안내설비, 영상감시설비, 방송설비, 공시청설비, 교통약자편의시설설비, 교환(전화)설비, 전기시계설비, 네트워크설비, 역무자동화설비, 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 구성도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점(관로, 맨홀 포함)에 대한 설명

나) 계산서

- 통신회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구통신실), NVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 재료마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전송설비, 통신선로(MDF 등), 열차무선, 안내설비, 영상감시설비(CCTV 등), 방송설비, 공시청설비(CATV 등), 교통약자편의시설설비(인터폰, 콜폰, 비상통화장치, 시각장애인 음성유도기), 교환설비(전화 등), 네트워크설비(LAN 등), 역무자동화설비, 기타 통신설비의 계통도(구성도)

- 각종 설비의 배치도 : 전송설비, 통신선로(MDF 등), 열차무선, 안내설비, 영상감시설비(CCTV 등), 방송설비, 공시청설비(CATV 등), 교통약자편의시설설비(인터폰, 콜폰, 비상통화장치, 시각장애인 음성유도기), 교환설비(전화 등), 네트워크설비(LAN 등), 역무자동화설비 등

- 기타 중간설계의 기준이 되는 도면

7) 소방설비

가) 설계 설명서

- 소방공사 대략공사비, 설계자의 분석검토서, 사전조사사항, 각종 방식에 대한 중간설계 설명서

나) 시방서 : 실시설계의 기준이 되는 당해 공사에 필요한 특기사항(발주기관의 지침을 받아 작성)

다) 설계계산서 : 주요장비의 개략 계산서

라) 도면종류

- 범례 및 도면목록

- 관련 화재안전기준

- 소방 분야별(기계·전기) 평면도, 소방설비 상세도 등

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

1.4. 실시설계

가. 정의

“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

다. 설계서 구성

1) 건축

가) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 사업면적, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부시공방법

- 공사비산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나) 구조계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

- 특기시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

- 당해 공사의 시방서에는 건축물의 내진능력*을 산정하여 준공표지판에 공개**하도록 필히 기술

* 건축물이 지진 발생 시에 견딜 수 있는 능력

** 내진능력은 수정 메르칼리 진도 등급(MMI 등급)과 최대지반가속도를 함께 표기(예시 : Ⅶ-0.150g)

라) 도면종류

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 조감도(투시도) : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 안내도, 구적도, 지적도, 면적 산출표

- 대지 종·횡단면도

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark, 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천장, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도(축척 : 1/100정도), 단위 평면도(축척 : 1/50정도)

- 각층 천장평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단열 및 방수계획도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체(축척 : 1/50정도)

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 평면도, 상세도, 입면도, 잡철물 목록

- 각층 천장 평면도, 상세도, 부분 상세도, 천장 관련 설치 상세도

- 콘코스 바닥 패턴도 및 전개도, 주요실 전개도, 승강기 HALL 전개 상세도, 화장실 전개 상세도, 칸막이 전개도 및 상세도

- 실내 마감상세도, 각 부품도

- 정화조 평·단면도, 각종 설비도, 계산서

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조평면도(축척 : 1/100정도) : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 계단 및 코아 상세도, 접합 상세도, 잡 상세도

- 가구도, 각부구조 상세도, 기타 상세도(보 OPENINT 위치도, 캐노피, 파라펫, 트러스)

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판 등

-  건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

※ 입면이 달라지는 부분은 평․입․단면상세도(축척 : 1/50정도)를 작성하여야 한다.

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

2) 토목

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획 및 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 구조 및 수리계산서

다) 지질조사보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사 등을 표기하고 실시설계내용에 반영

라) 시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.

마) 도면 종류

- 위치도, 주요 평면도, 대지 종·횡단면도

- 토공사 평·단면도, 흙막이 상세도(굴토깊이 10M 미만), 포장상세도

- 보도블럭 및 측구 상세도, 옹벽 평·단면 전개도, 옹벽 상세도

- 평면도, 구조물도, 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

3) 조경

가) 설계보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나) 시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

다) 도면 종류

- 도면 목록표, 배치도, 평면도

- 종단면도 및 횡단면도

- 입면도, 주요 상세도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격 조사자료 등

4) 기계설비

가) 설계 설명서

- 냉난방시스템, 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

다) 설계계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경 계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 필요시 견적서 등

라) 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도), 기계실 장비배치도

- 계통도 : 공조, 위생, 열원 및 냉난방, 급수급탕, 오배수 통기 및 우수배수, 오수정화 및 물재이용, 자동제어설비 등 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도, 옥외배관

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

바) 부하 계산서 : 설계기준에 따라 세부 부하 계산

5) 전기

가) 설계설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 전기소방, 기타 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블 트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

6) 정보통신

가) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신선로, 전송설비, 열차무선, 안내설비, 영상감시설비, 방송설비, 공시청설비, 교통약자편의시설설비, 교환(전화)설비, 전기시계설비, 네트워크설비, 역무자동화설비, 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

나) 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), NVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

라) 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전송설비, 통신선로(MDF 등), 열차무선, 안내설비, 영상감시설비(CCTV 등), 방송설비, 공시청설비(CATV 등), 교통약자편의시설설비(인터폰, 콜폰, 비상통화장치, 시각장애인 음성유도기), 교환설비(전화 등), 네트워크설비(LAN 등), 역무자동화설비, 기타 통신설비의 계통도(구성도)

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 전송설비, 통신선로(MDF 등), 열차무선, 안내설비, 영상감시설비(CCTV 등), 방송설비, 공시청설비(CATV 등), 교통약자편의시설설비(인터폰, 콜폰, 비상통화장치, 시각장애인 음성유도기), 교환설비(전화 등), 네트워크설비(LAN 등), 역무자동화설비 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블록 다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위 대가표, 가격조사자료 등

7) 소방

가) 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견 시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나) 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 소화수원량 산출서

다) 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

라) 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마) 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

2. 설계도서 관리·작성 시 유의사항

2.1 일반사항

가. 설계도서는 국토교통부 제정 ‘건축물의 설계도서 작성기준’, ‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준’에 따른 계획․중간․실시설계의 도서작성 기준 및 한국철도공사 ‘공사 및 용역관리규정’ 등에 의거 작성한다.

나. 수급인은 예비준공도서 제출 전 설계점검용 체크리스트를 작성하여 발주기관과 협의하여야 하며, 예비준공도서 제출 시 체크리스트에 의한 점검결과를 제출하여야 한다.

다. 설계설명서에 참여자별 성명, 담당분야 및 참여기간, 소지자격증 종류 등을 기록하여 추후 부실 설계 부문이 있을 경우 책임자를 분명히 파악할 수 있도록 하여야 한다.

라. 설계도면 및 기타 모든 성과물은 매장마다 작성자/검토자/확인자란을 만들어 관련자가 서명하여야 한다.

마. 수급인은 성과물에 대하여 타당한 작성근거를 제시할 수 있어야 한다. 수급인은 발주기관에서 설계내용에 대한 기술적 근거가 미흡하여 외부 전문가(해당분야 교수, 기술사 등)의 확인을 요구할 경우 응하여야 하며 그 결과를 발주기관에 보고하여야 한다.

바. 수급인은 분야간 원활한 시공을 위하여 건설산업기본법, 소방시설공사업법, 전기공사업법, 정보통신공사업법 등에 따른 건설업자, 소방시설공사업자, 전기공사업자, 정보통신공사업자 등의 각각의 수행범위에 대하여 설계설명서, 설계도면, 공사시방서 등의 설계 준공성과물에 주기 등의 방법으로 표현하여야 하며, 구분이 모호한 부분에 대하여는 발주기관과 협의하여 작성한다.

사. 본 과업과 관련하여 수급인이 작성 및 제출한 설계도서에 대한 저작권은 발주기관에게 귀속한다.

아. 수급인은 본 과업과 관련되는 내용을 발주기관의 사전승인 없이 영업 등의 목적으로 도서 등에 게재하거나 제3자에게 누설하여서는 안 된다.

자. 설계 준공성과물은 다음 7개 분야로 구분하여 작성하여야 한다. 단, 설계 설명서는 통합하여 작성한다.

1) 건축분야(건축, 구조 등)

2) 기계설비

3) 부대토목(조경 포함)

4) 전기설비(조명설비, 배관배선 등)

5) 통신설비(전화, 랜 설비 등)

6) 소방설비(기계·전기) 포함

7) 역무자동화설비(열차행선안내설비, 음성유도기 설비 포함)

※ 건축 폐기물도서는 성상별로 분리발주가 가능하도록 작성하여야 함.

차. 준공 성과물 제출목록, 부수 및 제본방법은 과업내용서를 참조하여 작성하되, 성과물별 분권이 필요할 경우에는 표지 하단에 (0/0)를 기재한다.

2.2. 설계설명서

가. 개요, 사전조사사항, 규모계획, 건축계획, 구조계획, 기계설비계획, 전기․통신설비 계획, 예정공정표, 개략공사비, 유지보수계획, 색상계획, 장비부하계산서 기타 필요한 사항 등 주요내용을 기술한다.

나. 상기 내용 작성 시 주요 그림은 가능한 칼라로 작성한다.

2.3. 설계도면

가. 일반사항은 건축제도 통칙(KS F 1501)을 준용한다.

나. 단위는 미터법으로 표기하되, 이외의 단위는 괄호를 사용하여 별도로 표기하여야 한다.

다. 약자는 영문에 한하여 보편적으로 사용되는 범위 내에서 사용하되, 반드시 약자 해설집을 작성 명기하여야 한다.

라. 설계도의 도면번호는 분야별(건축, 구조, 설비, 조경)로 윗머리 문자를 구분하여 기입하며, 도면 상호간에 연결번호 및 명칭을 상세히 기입하여 연관 도면을 찾기 용이하도록 작성하여야 한다.

마. 도면은 AUTO CAD로 작성하고, CD에 Font File, Plot style 등 내용을 알 수 있도록 목록을 함께 저장하여 제출한다.

바. 축척은 부득이한 경우를 제외하고 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/30, 1/50, 1/100, 1/200, 1/300, 1/400, 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200 등 일반적으로 사용되는 축척을 사용하여야 한다. (주변 도시계획선, 대지경계선, 중요건물 및 설계 증축건물 표시된 구내 전체 배치도는 1/1000 축척으로 작성)

사. 규격은 A1, A3로 하고 백상지로 보관이 용이하게 작성 제출하여야 한다.

아. 각 도면의 페이지 마다 키(Key)도면을 삽입하고 관련되는 도면의 연결번호를 명시한다.

자. 구조물 접속부분과 기타 상세한 도해가 필요한 곳에는 상세도를 첨부하여 도면의 이해가 용이하도록 하여야 한다.

차. 설계도서에 대한 대외 브리핑이 필요할 경우 설명용 도서를 작성 제출하여야 한다.

카. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

타. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 최종보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

2.4. 공사 시방서

가. 국토교통부 제정 “철도건설공사 전문시방서(건축편)” 및 “표준시방서(건축편)”의 내용을 기본으로 하여 작성하고, 건축공사 표준시방서 이외에 표기하기 힘든 내용의 시공기준, 시공방법, 주의사항 등 필요한 해당사항을 일반적인 내용과 특기한 내용을 공종별로 작성한다.

나. 공사시방서 작성방법은 한국철도공사 전문시방서(건축편)의 사용자 지침서(3.공사시방서 작성방법 일반사항, 4.전문시방서를 활용한 공사시방서 작성방법)를 참고한다.

다. 공사시방서는 설계도면에 명시되지 아니한 시공방법, 품질관리기준 등 시공에 관련되는 사항으로 작성하여야 하며 공사중 “환경친화적 철도 건설지침” 을 준수하도록 하는 내용을 명시하여야 한다

라. 표준시방서, 전문시방서에 표기되어 있지 않은 공정은 특기시방서를 추가 작성하여야 한다

마. 수급인은 설계준공 3개월전까지 책임기술자를 포함한 시방서 작성팀(분야별 책임기술자 등 5인 이상)을 별도 구성한 후 시방서 작성계획서(시방서 상세목록, 작성일정, 작성팀 등 포함)를 발주기관에 제출하여야 하며 시방서 내용 누락 등 오류 또는 모순 등에 대하여 설계준공 전 2회 이상 발주기관 감독자의 확인을 받아야 한다.

바. 각종 자재의 특성, 성격, 사용방법, 제작기준 등에 대하여 설명한다. 단, KS 규격에 맞는 제품은 해당 규격의 번호로 표시할 수 있다.

사. 목차순서는 다음 순으로 한다.

1) 제1편 : 총칙

2) 제2편 : 건축공사(건축, 구조)

3) 제3편 : 기계설비공사

4) 제4편 : 부대토목분야(조경 포함)

5) 제5편 : 전기공사(조명설비, 배관배선 등)

6) 제6편 : 통신공사(전화, 랜 설비 등)

7) 제7편 : 소방공사(기계·전기 포함)

8) 제8편 : 역무자동화설비(열차행선안내설비, 음성유도기 설비 포함)

2.5. 설계예산내역서

가. 설계예산내역서는 공종별 순서에 의하여 작성하되, 폐기물처리비용 등 제반 공사비가 포함되어야 하며 “조달청 건축공사 설계내역서 작성방법 안내(조달청/정보장터/업무별자료/시설공사자원정보 참조)”에 의거하여 작성한다.

나. 내역작성 프로그램은 조달청에서 선정 통보된 적산 응용프로그램 EMS로 작성하며 조달청 사업비 검토 의뢰 시 자재 및 인건비 코드의 불일치가 발생하지 않아야 하고, 발주기관 제출 시 EMS 파일을 CD에 수록․제출 한다

다. 설계예산내역서, 일위대가, 단가조사서, 수량산출서 통합하여 작성함을 원칙으로 하되, 설계특성에 따라 구분하여 작성 할 수 있다.

라. 수급인은 ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률’과 ‘중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역(중소벤처기업부 고시)’에 따라 발주기관이 직접 구매하여 제공하여야 하는 자재, 장비 등의 항목에 대한 내용을 검토하여 제출하여야 한다.

마. 설계예산내역서 작성 순서

1) 공사원가 작성 기준

2) 공사원가계산서

3) 직접비 공사총괄(01. 건축, 02. 건축기계설비, 03. 부대토목, 04. 전기설비, 05. 통신설비, 06. 소방설비)

바. 일위대가표 작성(01. 건축, 02. 건축기계설비, 03. 부대토목, 04. 전기설비, 05. 통신설비, 06. 소방설비)

사. 단가조사서(01. 건축, 02. 건축기계설비, 03. 부대토목, 04. 전기설비, 05. 통신설비, 06. 소방설비), 분야별 순서는 자재, 장비, 노무비, 견적 순으로 작성

아. 수량산출서(01. 건축, 02. 건축기계설비, 03. 부대토목, 04. 전기설비, 05. 통신설비, 06. 소방설비)

자. 시공상세도 작성 비용(추후 정산)을 설계예산내역서에 반영하여야 한다.

차. 신축역사(선상, 지상구분), 연결통로, 승강장 등으로 공간별로 구분하여 설계예산내역서를 작성하여야 한다.

2.6. 공사금액 산정 시 적용기준

가. 노임단가 : 대한건설협회에서 조사 공포한 최근의 시중노임단가

나. 환    율 : 금융결제원 발표 매매기준율

다. 단    가 : 단가산정은 조달청 시설공사 실적공사비 가격을 적용(조달청 홈페이지/통합자료실/업무별 자료실/시설공사 자원정보/시설공사 실적공사비 가격)하고, 조달청 실적공사비 가격에 등재되지 않은 단가의 적용순서는 다음과 같이 한다.

1) 최근 조달청이 공개한 가격정보 단가

2) 기획재정부장관에게 등록된 3개 이상의 조사기관 가격을 비교하여 낮은 단가

3) 신규품, 특수규격품 등 거래실례가격이 없는 경우 원가계산에 의해 산정한 단가

4) 위 기준에 따라 산출이 곤란한 품목은 3개 이상 사업자의 견적서를 비교․검토하여 낮은 단가

라. 수량은 건설공사 표준품셈(한국건설기술연구원제정) 및 계약예규의 예정가격 작성기준에 의거하여 산출하되, 표준품셈 및 공가원가 계산에 의하여 산출할 수 없는 특수사항에 대하여는 적정단가를 발주기관과 협의하여 산출한다.

2.7. 구조계산서

가. 구조계산은 합리적이고 정밀성을 기할 수 있도록 고려하여야 한다.

나. 구조계산 전산시 프로그램의 타당성, 공인여부, 해석방법, 적용하중 등 단계별 구체적 과정을 서술하여야 하며, 해석결과에 대하여 수계산이나 근사적인 방법에 의한 검토 확인이 될 수 있도록 하여야 한다.

2.8. 건축설비계산서(기계설비 및 소방설비 계산서)

가. 기계설비 계산서는 쾌적한 환경을 설정하고 자연적인 방법과 기계적인 방법을 검토 분석하여야 한다.

나. 소방설비 계산서는 소방관련 법규 및 화재안전기준에 적법하게 검토 분석하여야 하며, 성능 만족 및 유지보수에 적합한 장비를 선정하여야 한다.

2.9. 공사설계서

가. 공사설계서에는 설계설명서, 공사시방서(별책), 수량조서(공내역서), 공사 예정공정표, 설계도면(별책) 등이 포함되어야 한다.

나. 작성 순서

1) 설계설명서

2) 공사시방서(별책)

3) 공사예정공정표

4) 설계예산내역서

5) 설계도면(별책)

다. 소방공사 설계서는 위 작성순서에 따라 별도로 작성하여야 한다.

2.10. 과업수행보고서

설계용역 과업 추진 중 시행된 상세내역(현장조사, 착수보고회, 설계자문회의, 발주기관․수급인간 수발문서, 수급인과 관계기관 민원인 등과의 문서, 기타 용역 수행시 발생된 문서 일체 등)을 포함하여야 한다.

2.11. 요약보고서

설계설명서의 주요사항과 설계도면의 주요도면(평면도, 단면도, 입면도등)및 설계예산내역서의 각공사별, 공종별 집계표와 원가계산서를 포함하여야 한다.

Ⅴ. 설계도서 납품

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획설계(안)	A3	3	부	계략적조감도 반접이
2	현장조사보고서	A4	3	부
3	관련법규 검토서	A4	3	부	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 에너지 관련법령 등 포함
4	공사비 검토서	A4	3	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토공종별 책임기술자 확인(날인)
5	현황측량보고서	A4	7	부
6	기타	A4	3	부	체크리스트(각 공종 감독관 확인) 공사비 증액 검토자료(필요 시)CD 등

1. 계획설계 납품도서 목록

※ 발주기관 요구사항에 대한 조치(반영)결과 보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종								비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방	역무자동화
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	주요자재 비교검토서 포함 재료 검토서 포함
2	설계도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리, 반접이
3	내 역 서(관급포함)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	각 공종별 예산 분배표 * 공종별책임기술자 확인
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	조달청 제공양식 특기시방 포함
6	설계VE 결과보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	조감도			부									파일만 제출 내부투시도 포함
8	각종 예비인증 관련 검토서	A4	3	부	통합본								건축물 에너지효율인증 장애물 없는 생활환경(BF)
9	신재생에너지설치계획서	A4	3	부	통합본								문서, 사전 제출
10	공사예정공정표	A4	3	부	통합본								국토부 고시(공사기간) 검토내용 포함
11	기타 발주기관 요구사항, 체크리스트	A4	3	부	통합본								공사비 예산 초과 시 조치계획서 제출

2. 중간설계 납품도서 목록

※ 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

- 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

- 예산초과 시 예산절감방안 검토서

- 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부훈령)에 따른 공사기간 검토자료(필요시)

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출(수량 협의)

※ 설계VE 반영결과 제출

- 설계VE 검토, 확인, 반영된 설계도면

- 설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

- 설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

- 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

3. 실시설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종								비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방	역무자동화
1	최종보고서	A4	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		1부로 작성
2	설계설명서	A4	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	원도	A1	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	발주기관 요구 시
4	설계도면	A1	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
		A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	각종 계산서	A4	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서(도급/관급)	A4	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	건축, 설비는 EMS7 내역서 작성시 선상연결통로, 승강장, 광장 등 공간별로 구분하여 작성
7	수량산출서	A4	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	건축, 설비는 FIN6.2, MQC7
8	단가산출서	A4	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	단가비교표, 견적서 포함
9	일위대가표	A4	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	구조계산서	A4	5	부	◯
11	구조안전검토보고서	A4	5	부	◯
12	장비부하계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	건축설비계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	지장물 조서	A4	5	부	◯
15	과업수행보고서	A4	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
16	요약보고서	A4	10	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
17	일반시방서	A4	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
18	전문시방서	A4	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	특기시방서
19	조감도		협의	부	◯								A1 이상(추후협의) 표구포함(추후협의)
20	미니차트	B4	4	부	◯
21	공정표		협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	도면에 포함, 전 공종 포함
22	녹색건축 예비인증서												해당 시
23	건축물 에너지효율 예비인증서												해당 시
24	장애물 없는 생활환경 예비인증서												해당 시
25	제로에너지건축물 예비인증서												해당 시
26	에너지절약 계획서												해당 시
27	설계안전보건대장, 설계안정성 검토에 따른 설계 안전성 검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항
28	공사계약요청 자료	공사원가계산서(총차/금차예산), 관급자재목록, 공사원가계산서(모두excel file), 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등											공사개요, 현장설명서 포함
29	자재 사양서	A4	협의	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
30	자재 견본 자료	A4	협의	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		제품명, 색상, 규격 등 포함
31	인·허가 도서	A4	협의	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯		건축협의서, 실시계획인가 협조자료
32	손해배상보험증권	A4	3	부
33	건축물 관리계획서	A4	3	부
34	설계변경 환류자료 및 하자DB자료 검토서		2	부									조달청 홈페이지 참조
35	DVD(CD)		협의	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	계획/중간/실시/각종 심의/EMS내역, 설계서, 조감도, 인허가관련문서/회의록/ 각종 발표자료 등 포함
36	기타 발주기관 요구사항, 체크리스트

3.1 공종별 실시설계 제출 목록

1) 납품품목은 각 기술 분야로 구분하여 해당된 분야별로 지정된 감독자에게 다음과 같이 납품한다. 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 실시하여야 한다. 전 분야에 대한 성과물은 CD 1매에 총괄 저장 제출한다.(각 분야별 설계도면, EMS내역, 설계서, 조감도, 폰트 등 각종 성과물 파일 포함)

2) 도면상의 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나 한글 사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

3) 설계도서의 작성은 ‘공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준’ 에 따라 작성한다.

4) 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5부와 A1 이상(표구 포함) 3부, 원본File을 CD로 제출(수량 협의)

5) 지적사항, 검토사항 반영 결과보고서를 포함하여 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

6) 에너지 절약계획서 관련 증빙서류

7) 폐기물처리는 관련 규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3.2. 최종보고서

1) 최종보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

2) 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사물량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

3.3. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

1) 공사개요서는 수요기관의 총공사비 예산 및 당해 연도 공사비예산(장기계속계약)을 구분하여 작성하되, 건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물, 기타 예산을 예정공정표를 근거로 금차공사기간 및 금차공사금액을 추정 산출하여야 한다.

2) 현장설명서는 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 작성하여야 하며, 자재 선정내용 등을 정확히 기재하여야 한다.

3.4. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

3.5. 제출목록, 제본, 편집방법, 제출부수 및 규격은 설계 발주용역 특성에 따라 발주기관과 협의 후 결정한다.

3.6. 손해배상보험증권(보증기간은 공사 준공까지 산정)

					3. 예 정 공 정 표
용역명 : 호남선 목포역 시설개선 사업 설계용역
용 역 종 류	단위	수 량	용 역 기 간 (월)																	기 사
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
			계획설계			중간설계				실시설계							행정기간
1. 건축설계	㎡	4,231.8																		12개월 : 과업 수행
2. 전기공사 설계	식	1							계획		중간		실시
3. 통신공사 설계	식	1							계획		중간		실시
4. 소방공사 설계	식	1							계획		중간		실시
5. 행정기간	식	1																		3개월 : 사업비 조정 및 확정을 위한 행정기간

용역명 : 호남선 목포역 시설개선 사업 설계용역
	4. 설계예산내역서
	총 공 사 비
	1.	도 급 공 사 비	별 봉
	2.	지급 자재비 (당기조달품)
	3.	지급 자재비 (전년도 조달품)
	4.	지급 자재비 (중고품)
	5.	지급 자재비 (레미콘, 충용품)
	6.	철도공사제공 기계기구 사용료
	7.	철도공사 직원급
	8.	철도공사직원급 일반관리비
	9.	재료 일반 관리비
	10.	운 송 비
	11.	입 찰 수 수 료
	12.	용 역 감 독 여 비
	13.	준 공 검 사 여 비

5. 용 종 별 예 산 조 서
용 역 종 류	규 격		단위	수 량	단 가		금 액	기 사
용역명 : 호남선 목포역 시설개선 사업 설계용역								별봉
1. 건축공사 설계	(계획, 중간, 실시설계)		㎡	4,231.8
1-1. 건축설계	(계획, 중간, 실시설계)		㎡	4,231.8
1-2. 수수료 등	설계안전성 검토 및 각종 인증수수료 등							준공시 정산
2. 전력공사 설계	(계획, 중간, 실시설계)		식	1
3. 통신·신호공사 설계	(계획, 중간, 실시설계)		식	1
4. 철도운행안전관리자			인·일					준공 시 실 투입 일 수 정산
5. 열차감시원			인·일					준공 시 실 투입 일 수 정산
6. 전기철도안전관리자			인·일					준공 시 실 투입 일 수 정산
7. 손해배상보험료			식	1
8. 부가가치세
도급금액								천원이하 절사

	6. 안전계약특수조건
개정 2022. 01. 24. 제1조(목적) 본, 안전계약 특수조건은 한국철도공사와 수급인이 체결하는 공사·용역·물품(제조) 계약에 있어 일반조건 외에 중대재해 및 산업재해예방과 철도안전법령에 따른 철도안전관리체계에 대한 점검 및 준수의무 등을 특별히 규정함에 그 목적이 있다. <개정 2022.1.24.> 제2조(적용범위) 한국철도공사의 사업장내에서 시행하는 모든 발주공사와 용역사업 및 물품(제조)사업의 수급인 대상으로 한다. <개정 2022.1.24.> 제3조(안전준수 의무 등) 수급인은 공사·용역·물품(제조) 계약의 이행과 관련하여 중대재해 처벌등에 관한 법률, 산업안전보건 관계법령 및 철도안전법령과 안전수칙을 준수하여야 하며, 한국철도공사에서 시행하는 산업재해예방 시책 및 철도안전관리체계와 중대재해 예방을 위한 평가에 적극 따라야 한다. <개정 2022.1.24.> 제4조(사전예방조치 의무 등) 수급인은 공사·용역·물품(제조) 계약의 이행과 관련하여 유해·위험요인 실태를 수시로 파악하고 평가하여 불안전요소를 개선하는 등 산업재해예방 및 철도안전을 위한 사전조치를 하여야 한다. <개정 2022.1.24.> 제5조(통지 의무 등) 수급인은 공사·용역·물품(제조) 계약의 이행과 관련하여 중대재해가 발생하였거나 긴박한 재해발생 우려가 있다고 판단될 경우 해당 작업자를 대피시키고 지체 없이 한국철도공사에 통지하여야 한다. <개정 2022.1.24.> 제6조(안전·보건협의체 등) 수급인은 공사·용역·물품(제조) 계약의 이행과 관련하여 한국철도공사가 운영하는 안전·보건협의체의 당연 구성원이 되며 협의회에 출석할 의무와 필요시 임시회의 개최요구를 할 권한이 있다. <개정 2022.1.24.> 제7조(안전보건지도·점검 등) ① 한국철도공사는 수급인이 공사·용역·물품(제조)이행 과정에서 취하는 산업재해 예방조치를 확인하기 위하여 언제든지 안전지도·점검을 시행할 수 있으며 수급인은 지도·점검에 동참하는 등 적극 협조하여야 한다. <개정 2022.1.24.> ② 한국철도공사는 안전지도·점검결과에 따라 필요하다고 인정하는 경우 수급인에게 시정요구를 할 수 있으며 시정요구를 받은 수급인은 한국철도공사에 개선계획 및 개선결과를 제출하여야 한다. ③ 수급인은 철도안전법령에 따라 한국철도공사가 요구하는 열차운행 및 유지관리에 대한 철도안전관리체계의 준수 및 적정성 평가를 따라야 한다. ④ 수급인은 착수 시 한국철도공사가 제3항의 내용에 따라 제시한 안전관리체계 준수 및 적정성에 대한 평가시기, 평가방법 및 평가항목에 대해 적극 협조하여야 하며 정당한 이유가 없는 한 평가결과에 따른 조치 요구를 수행하여야 한다. ⑤ 한국철도공사는 공공기관의 안전관리에 관한 지침에 따라 수급인이 실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 부실 시 보완조치를 요구할 수 있으며, 수급인은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다. 제8조(공사·용역·물품(제조) 중지 등) ① 한국철도공사는 안전지도·점검결과 긴박한 사고발생 우려가 있는 유해·위험요인을 발견하였을 경우 그 유해·위험요인이 완전히 해소되었다고 인정될 때까지 수급인에게 해당 공사, 용역, 물품(제조)의 중지를 요청할 수 있으며, 수급인은 정당한 이유가 없는 한 이에 응하여야 한다. <개정 2022.1.24.> ② 수급인은 제1항의 규정에 따라 공사, 용역, 물품(제조) 중지로 발생되는 지체상금 부과 및 작업원에 대한 휴업급여 등의 책임을 진다. <개정 2022.1.24.> 제9조(공사·용역·물품(제조) 계약해지) 한국철도공사는 수급인이 공사·용역·물품(제조) 과업수행 중 수급인의 귀책사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고가 발생한 경우에는 해당 계약을 해지할 수 있다. <개정 2022.1.24.> 1. 중대재해 처벌 등에 관한 법률에 정한 “중대산업재해” 및 “중대시민재해”가 발생한 경우 2. 철도사고조사 및 피해구상 세칙에 정한 열차사고(열차충돌, 열차탈선, 열차화재)가 발생한 경우

7. 도급사업 안전평가

계약예정자(당선자)는 계약체결 전 문서로 도급사업 안전평가를 위한 자료*를 제출하여야 한다.     * [붙임 1, 2] 세부평가기준을 참고 하여 작성

1. 근거 : 「중대재해처벌법 시행령」 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무), 동법 시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치), 제10조(공중이용시설 관련 안전보건관리체계 구축 및 이행에 관한 조치), 「산업안전보건법」 제61조(적격 수급인 선정 의무)

2. 대상 : 중대재해처벌법 시행령 제4조 및 제10조에 따라 우리공사의 시설, 장비, 장소에서 실질적인 지배ㆍ운영ㆍ관리하는 책임이 있는 도급, 용역, 위탁 업무 중 종사자와 여객 또는 공중의 안전ㆍ보건 관리가 필요한 대상

3. 평가시기 : 중대산업재해 및 중대시민재해 예방을 위한 적격 수급인의 선정을 위해 산업안전보건법 제 61조에 의거하여 계약체결 전 평가 시행

* 평가 기준등급 미만일 경우, 미흡사항을 1회에 한하여 보완 후 재평가(안전보건수준평가 C등급 이상, 안전관리능력평가 A등급 이상)

4. 평가절차

- 낙찰예정자에 대해 안전보건수준평가 및 안전관리능력평가 후 계약체결

절차	계약요청 입찰공고 입찰 낙찰예정자 계약체결 안전보건수준평가 안전관리능력평가

5. 평가기준 : 고용노동부 「도급사업 안전보건관리 운영 매뉴얼」 및 국토교통부 「중대시민재해 가이드라인」 준용       * [붙임 1, 2] 참고

6. 제출방법 : 시행부서로 원본제출(제출 방법 및 주소지는 계약부서의 낙찰예정자 통보 이후 별도 통보)

붙임1		중대산업재해 관련 안전보건수준평가 기준(안)

□ 평가항목 및 기준

평가항목	평가기준	배점	세부기준
			우수	보통	미흡
총계		100
	안전보건관리체계	40
1. 안전보건방침	안전보건방침의 수립	10	10	7	4
2. 이행계획	중대재해예방을 위한 이행계획 수립	20	20	14	8
3. 역할분담	이행계획 추진을 위한 구성원 역할분담	10	10	7	4
	실행수준	40
4. 위험성 평가	위험성 평가 수립	20	20	14	8
5. 안전교육	안전보건교육 계획 수립	10	10	7	4
6. 안전작업허가	유해ㆍ위험작업 안전작업허가 이행	10	10	7	4
	재해발생 수준	20
7. 재해발생현황	최근 3년간 산업재해발생 현황	20	20	14	8

* (평가등급) 5단계 평가로 시행

등급	점수	이행수준
S	90점 이상	자발적ㆍ지속가능한 안전ㆍ보건 업무수행능력을 갖춤
A	80점 이상	의무사항을 충족하고 안전ㆍ보건 업무수행 능력 우수
B	70점 이상	안전ㆍ보건 업무수행 능력 양호
C	60점 이상	안전ㆍ보건 업무수행 능력 보통
D	60점 미만	안전ㆍ보건 업무수행 능력 미흡
<선정기준> - A등급 이상 : 화재폭발 우려장소(인화성 액체 증기, 가스, 고체 존재) 및 밀폐공간 장소 작업 - B등급 이상 : 열차충돌 우려장소, 고소 작업 장소 - C등급 이상 : A, B 등급 이외 작업 - D등급 : 낙찰자 배제

* (평가결과조치) 선정기준 등급 미만 평가 시 낙찰자 대상 배제

<세부평가기준>

□ 안전보건관리체계

평가항목	평가기준	배점	세부기준
			우수	보통	미흡
	안전보건관리체계	40
1. 안전보건방침	안전보건방침의 수립	10	10	7	4
2. 이행계획	중대재해예방을 위한 이행계획 수립	20	20	14	8
3. 역할분담	이행계획 추진을 위한 구성원 역할분담	10	10	7	4

1. 안전보건방침의 수립

◦ (우수) 도급사업자 규모 및 특성에 맞는 안전보건방침 수립, 안전보건을 확보하기 위한 지속적인 개선 및 이행의지 포함

◦ (보통) 도급사업자 특성, 지속적인 개선 및 이행 의지가 구체적이지 않음

◦ (미흡) 안전보건방침이 없거나, 안전보건 이행의지 결여

2. 중대재해예방을 위한 이행계획 수립

◦ (우수) 산재예방활동에 따른 도급업체의 활동에 부합하는 목표와 측정 가능한 성과지표가 수립되고 법규 요구사항 충족

◦ (보통) 도급업체 활동에 대한 이행계획이 수립되었으나, 성과지표와 요구사항 충족여부가 구체적이지 않음

◦ (미흡) 이행계획을 제출하지 않았거나 상당부분이 결여되어 중대재해예방 이행계획으로 인정하기 어려움

3. 이행계획 추진을 위한 구성원 역할분담

◦ (우수) 이행계획의 효율적 추진을 위한 업체 안전보건조직의 구성, 역할, 책임 및 권한을 명시하고 유해･위험작업을 수행하는 구성원은 업무수행에 필요한 자격과 능력을 가지고 있고, 교육･훈련을 통하여 자격과 능력을 유지

◦ (보통) 안전보건조직은 구성되었으나 유해ㆍ위험작업을 수행하는 구성원의 업무수행 자격과 능력, 교육ㆍ훈련 내용 미흡

◦ (미흡) 안전보건조직이 구성되지 않거나 유해ㆍ위험작업을 수행하는 구성원의 자격과 능력 없고, 교육ㆍ훈련 계획 없음

평가항목	평가기준	배점	세부기준
			우수	보통	미흡
	실행수준	40
4. 위험성 평가	위험성 평가 수립	20	20	14	8
5. 안전교육	안전보건교육 계획 수립	10	10	7	4
6. 안전작업허가	유해ㆍ위험작업 안전작업허가 이행	10	10	7	4

4. 위험성 평가 수립

◦ (우수) 업체 규모 및 위험작업 특성을 고려, 적절한 위험성평가기법으로 절차에 따라 실시

◦ (보통) 작업에 사용되는 설비, 물질 및 작업특성에 대한 유해･위험요인 파악이 누락되거나 구체적이지 않음

◦ (미흡) 자체 위험성평가 절차 또는 결과가 없음

5. 안전보건교육 계획 수립

◦ (우수) 법정 안전보건교육 종류별로 교육내용, 시기, 대상자, 장소, 성과지표 등 요구사항을 포함하여 계획 수립됨

◦ (보통) 법정 안전보건교육 계획은 수립되었으나 요구사항 미흡

◦ (미흡) 법정 안전보건교육 계획이 없음

6. 유해ㆍ위험작업 안전작업허가 이행

◦ (우수) 안전작업허가 대상 종류와 허가절차 및 업무역할이 지정되고 기록, 경유 및 보관에 대한 이행계획이 수립됨

◦ (보통) 안전작업허가에 대한 이행절차는 수립되었으나 절차의 누락 및 역할이 미흡함

◦ (미흡) 안전작업허가 절차가 없음

□ 재해발생현황

평가항목	평가기준	배점	세부기준
			우수	보통	미흡
	재해발생 수준
7. 재해발생현황	최근 3년간 산업재해발생 현황 * 안전보건공단에서 발급한 최근 3년간 산업재해율확인서 제출 * 사업장 가동기간이 2년 미만인 경우는 해당 가동 기간만으로 산정 * 1년 미만 신규업체는 평가항목에서 재해발생수준을 제외	20	20	14	8

7. 재해발생현황

◦ (우수) 휴업을 제외한 2년 동안 무재해사업장을 유지하거나, 3년 연속 동종업종 평균재해율 미만임

◦ (보통) 최근 2년 연속 동종업종 평균재해율 미만임

◦ (미흡) 최근 2년 동안 사망재해가 있거나, 최근 2년 동안 동종업종 평균 재해율 이상이 있는 경우

※ 산업재해율확인서 발급관련 기간 산정 시 산업재해발생 현황은 공고일 기준으로 하되 고용노동부 산업재해 현황 통계 공표시기(상반기는 8월말, 하반기는 익년도 3월말)가 일정치 않아 아래의 예시 참고

* 예시 : 공고일이 2022년 3월 25일이고  21년 하반기 산업재해 현황 통계가 공표된 경우 최근 3년간 산업재해율 기간은 19년～21년까지, `21년 하반기 산업재해 현황 통계가 공표가 안 된 경우 18년 7월부터 21년 7월까지로 한다.

붙임2		중대산업재해 관련 안전보건수준평가 기준(안)

□ 평가항목 및 기준(1안)   * 국토교통부 중대시민재해 가이드라인 ‘수탁기관 안전관리능력 산정기준’

평가항목

평가기준

배점

세부기준

우수

보통

미흡

총계

100

1. 안전 인력 및 예산 현황

ㆍ안전 전문 인력 보유 현황

ㆍ안전 예산 현황(안전 예산 편성항목, 매출액 대비 비중 등)

20

20

14

8

2. 안전관리규정·지침·매뉴얼 현황

ㆍ법정 보유 안전관리규정/지침/매뉴얼 구비 여부

20

20

14

8

3. 재해대응체계 현황

ㆍ재해신고·보고 절차도 유무

ㆍ재해대응 조직 및 업무분장 현황

ㆍ유관기관 비상연락망 유무

20

20

14

8

4. 교육 및 훈련실적

ㆍ교육 및 훈련 프로그램 유무

ㆍ최근 3년간 안전교육 및 훈련 실적

20

20

14

8

5. 중대재해 발생에 따른 행정처분 등

ㆍ중대재해로 인한 행정처분 유무 및 처분정도

20

20

14

8

* (평가등급) 3단계 평가로 시행

등급	점수	이행수준
A	80점 이상	의무사항을 충족하고 중대재해예방 능력 우수
B	60점 이상	중대재해예방능력 확보
C	60점 미만	중대재해예방능력 미흡
<선정기준> - A 등급 : 공중이용시설 대상 관련 작업 - B 등급 : A등급 이외 작업 - C 등급 : 낙찰자 배재

* (평가결과조치) 선정기준 등급 미만 평가 시 낙찰자 대상 배제

<세부평가기준>

1. 안전인력 및 예산현황(안전인력 및 예산현황을 50%씩 적용)

◦ (우수) 설계서에 계상된 안전전문인력 및 중대시민재해 예방을 위한 안전전문인력을 확보하고 있으며 산업안전관리비를 사업장 특성을 고려하여 목적에 맞게 집행하기 위한 계획이 수립되어 있음

◦ (보통) 설계서에 계상된 안전전문인력을 확보하고 있으며 산업안전관리비 집행 계획 있음.

◦ (미흡) 설계서에 계상된 안전전문인력이 확보되지 않고, 산업안전관리비 집행 계획 없음.

2. 안전관리규정ㆍ지침ㆍ매뉴얼 현황(규정/지침/매뉴얼 중 1개 이상)

◦ (우수) 최근 법령 개정 사항 등을 반영한 안전관리규정/지침/매뉴얼이 있는 경우

◦ (보통) 안전관리규정/지침/매뉴얼이 있는 경우

◦ (미흡) 안전관리규정/지침/매뉴얼이 없는 경우

3. 재해대응체계 현황

◦ (우수) 재해신고ㆍ보고 절차가 있으며, 재해대응 조직과 업무분장이 되어 있고, 유관기관 비상연락망을 갖추고 있는 경우

◦ (보통) 재해신고ㆍ보고 절차가 있으나, 재해대응 조직과 업무분장이  및 유관기관 비상연락망을 없는 경우

◦ (미흡) 재해신고ㆍ보고 절차가 없는 경우

4. 교육 및 훈련실적

◦ (우수) 교육 및 훈련 프로그램이 있으며, 최근 3년간 지속적으로 안전교육 및 훈련을 시행한 경우

◦ (보통) 교육 및 훈련 프로그램이 있으며, 최근 1년이내 안전교육 및 훈련을 시행한 경우

◦ (미흡) 교육 및 훈련 프로그램이 없는 경우

5. 중대재해 발생에 따른 행정처분 등

◦ (우수) 최근 3년 내 중대재해에 따른 행정처분이 없었음

◦ (보통) 최근 3년 내 중대재해로 인한 행정처분으로 업무정지 30일 이상 6개월 미만이나 이에 해당하는 과징금을 부과한 사례가 있는 경우

◦ (미흡) 최근 3년 내 중대재해로 인한 행정처분으로 업무정지 6개월 이상이나 이에 해당하는 과징금을 부과한 사례가 있는 경우

□ 평가항목 및 기준(2안)     * 국토교통부 중대시민재해 가이드라인 참조

평가항목

평가기준

배점

세부기준

우수

보통

미흡

총계

100

1. 안전인력

안전과 유지관리를 위한 인력 확보

10

10

7

4

2. 안전예산

안전관리의 이행을 위한 안전예산 계획

10

10

7

4

3. 안전점검

안전보건관계법령에 따른 안전점검 계획

10

10

7

4

4. 안전계획

공중이용시설의 설치 및 유지관리에 관한 사항

20

20

14

8

5. 유해ㆍ위험확인

공중이용시설의 유해ㆍ위험요인의 확인

20

20

14

8

6. 긴급조치

중대시민재해 발생 시 조치에 대한 사항

10

10

7

4

7. 중대재해 발생에 따른 행정처분 등

중대재해로 인한 행정처분 유무 및 처분정도

20

20

14

8

* (평가등급) 3단계 평가로 시행

등급	점수	이행수준
A	80점 이상	의무사항을 충족하고 중대재해예방 능력 우수
B	60점 이상	중대재해예방능력 확보
C	60점 미만	중대재해예방능력 미흡
<선정기준> - A 등급 : 공중이용시설 대상 관련 작업 - B 등급 : A등급 이외 작업 - C 등급 : 낙찰자 배재

* (평가결과조치) 선정기준 등급 미만 평가 시 낙찰자 대상 배제

<세부평가기준>

1. 안전인력

◦ (우수) 설계서에 계상된 안전전문인력 및 중대시민재해 예방을 위한 안전전문인력을 확보하고 있음

◦ (보통) 설계서에 계상된 안전전문인력을 확보하고 있음

◦ (미흡) 설계서에 계상된 안전전문인력을 미확보

2. 안전예산

<중대시민재해 예방을 위한 안전예산>

∘ 유해ㆍ위험요인 확인ㆍ점검 비용 및 이의 발견 또는 신고된 경우 긴급안전점검ㆍ긴급안전조치ㆍ정비ㆍ보수보강 등을 위한 예산

∘ 시설의 기능유지, 안전관리 시설물 설비의 설치 예산

∘ 중대시민재해 발생 시 원인 개선을 위한 작업자 교육 또는 이용자 안내 조치 예산

∘ 안전관리에 필요한 물품ㆍ보호구 및 장비 구입 예산

∘ 법령에 따른 안전점검을 위해 필요한 예산

◦ (우수) 중대시민재해 예방을 위한 대상을 인지하고 있으며 안전예산 투입계획 및 예산확보 방안이 있음

◦ (보통) 중대시민재해 예방을 위한 대상을 인지하고 있으며 안전예산 투입계획이 있음.

◦ (미흡) 중대시민재해 예방을 위한 대상 및 안전예산 투입 계획이 없음

3. 안전점검

◦ (우수) 중대시민재해 예방을 위한 점검인력, 점검주기, 점검방법 등 안전점검 계획이 수립되어 있으며 점검을 위한 기구, 장비 등을 갖추고 있음

◦ (보통) 중대시민재해 예방을 위한 안전점검 계획이 수립되어 있음

◦ (미흡) 중대시민재해 예방을 위한 안전점검 계획이 없음

4. 안전계획

◦ (우수) 해당 공중이용시설 관련 중대시민재해 예방을 위한 공정, 시공에 대해 착공부터 준공 시 까지 구체적인 안전계획이 수립된 경우

◦ (보통) 해당 공중이용시설 관련 중대시민재해 예방을 위한 안전계획이 수립된 경우

◦ (미흡) 해당 공중이용시설 관련 중대시민재해 예방을 위한 안전계획이 수립되지 않은 경우

5. 유해ㆍ위험확인

◦ (우수) 해당 수급업무 수행 중 예상되는 유해ㆍ위험 사항을 인식 하고 위험성 평가를 통해 안전대책이 강구된 경우

◦ (보통) 해당 수급업무 수행 중 예상되는 유해ㆍ위험 사항을 인식한 경우

◦ (미흡) 해당 수급업무 수행 중 예상되는 유해ㆍ위험 사항을 인식하지 못한 경우

6. 긴급조치

◦ (우수) 해당 수급업무 수행 중 예상되는 긴급사항을 인식하고 조치계획 및 시행을 위한 대응방안이 있는 경우

◦ (보통) 해당 수급업무 수행 중 예상되는 긴급사항을 인식하고 조치계획이 있는 경우

◦ (미흡) 해당 수급업무 수행 중 예상되는 긴급사항을 인식하지 못한 경우

7. 중대재해 발생에 따른 행정처분 등

◦ (우수) 최근 3년 내 중대재해에 따른 행정처분이 없었음

◦ (보통) 최근 3년 내 중대재해로 인한 행정처분으로 업무정지 30일 이상 6개월 미만이나 이에 해당하는 과징금을 부과한 사례가 있는 경우

◦ (미흡) 최근 3년 내 중대재해로 인한 행정처분으로 업무정지 6개월 이상이나 이에 해당하는 과징금을 부과한 사례가 있는 경우