설계용역 과업지침서 【 경상북도교육청 환경교육센터 건립 설계용역 】

2025  1.

	경상북도교육청

목    차

Ⅰ. 설계개요	2

Ⅱ. 일반사항	6

Ⅲ. 공통설계 지침	10

Ⅳ. 계획설계 지침	15

Ⅴ. 중간설계 지침	19

Ⅵ. 실시설계 지침	21

Ⅶ. 건축공사 설계지침	24

Ⅷ. 토목공사 설계지침	26

Ⅸ. 조경공사 설계지침	28

Ⅹ. 지질조사 지침	30

Ⅺ. 설계도서 작성 및 납품	32

【붙임 1】 실별 소요면적(SPACE PROGRAM)

【붙임 2】 부지 현황

【붙임 3】 주간 공정보고

【붙임 4】 월간 공정보고

【서식 1~8】 착수계, 완료계 서식

Ⅰ		설 계 개 요

1. 용역명: (가칭)경상북도교육청 환경교육센터 건립 설계용역

2. 목적

가. 경북과학고등학교의 이전 후 유휴시설(현, 생활관동) 활용방안의 하나로

체험·실천 중심의 생태환경교육으로의 패러다임 변화와 기후위기, 환경재난에

대응할 수 있는 지식과 기능 태도·가치관 등 환경 감수성을 지닌 인재육성 및

환경교육 교사연수 프로그램 개발, 운영을 통한 교사의 전문성 제고 등

환경교육센터를 구축하고자 한다.

나. 동일 부지내 경상북도교육청과학원과 수학문화관의 적극적인 연계 및 동시

수용으로, 지역 청소년 뿐 아니라 일반인들에게 환경 프로그램 공유 및 지원

강화를 통해 생태환경문화 형성으로 공공시설을 효율적으로 활용하고자 한다.

3. 사업개요

가. 대지 위치: 경상북도 포항시 북구 용흥동 우미길 93 (구)경북과학고등학교)

나. 대지 면적: 학교부지 33,524㎡

다. 사업 규모

1) 환경교육센터 증축공사 및 외부공간 구성

2) 추정 연면적: 2,690.49㎡ (±5% 범위 내에서 조정 가능)

라. 계획안 제안 대상범위

계획대상지 및 사업대상-생활관동(C동)

1) 계획대상지 면적: 외부공간(약 4,300㎡) 및 운동장, 주차장

※ 계획대상범위 내에서 외부공간 활용계획 제시

2) 사업대상 건물

- 사업대상: 구) 경북과학고등학교 생활관동(C동)-전체철거

- 연면적 : 2,690.49㎡

- 층  수 : 지하1층, 지상3층

- 철거와 관련된 해체계획서 작성 및 해체공사 관련 용역은 별도 발주한다.

3) 계획 범위

-사업내용: 가칭)경상북도교육청 환경교육센터 증축공사

- 연면적 : 2,690.49㎡ (±5% 범위 내에서 조정 가능)

- 층  수 : 지하1층, 지상3층

마. 총공사비 : 8,935,153천원 (부가세 포함)

※ 예정공사비는 전기, 통신, 소방공사비 제외하며, 건축, 기계설비, 토목, 조경분야,

신재생에너지 등에 대한 공사비 및 각종 인입에 따른 시설분담금은 포함한다.

※ 사업규모 및 예산액 범위 내 설계하는 것을 원칙으로 한다.

4. 과업범위

가. 본 용역 계약상대자는 계획설계, 중간설계 및 실시설계를 수행하여야 하며, 설계범위는 건축, 기계설비, 토목, 조경 분야를 포함한다.

나. 본 공사 준공 이후 건축행정시스템(세움터) 건축물관리대장 등재 업무를 수행하여야 한다.

다. 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 예비인증: 장애물 없는 생활환경 예비인증의 대상은 아니나 노약자들이 사용하기에 불편함이 없도록 BF에 준하는 시설은 적극 검토·반영하여야 한다.

라. 에너지 절약계획서: 녹색건축물 조성 지원법 제14조(에너지 절약계획서 제출)에 의해 공공건물 74점 이상으로 설계하고 증빙 받아야 한다.

마. 최근 개정된 내진설계기준 및 KBC기준에 의거하여 내진설계를 적용하여야 하며 구조의 내진안전성 검토확인을 거쳐야한다.

바. 경상북도교육청(이하 “우리 청”이라 한다)의 중간설계 심의협의회 및 사용자 측(교사, 학생, 학부모, 지역민) 설계 설명회 등 모든 협의회의 관련서류 작성과 브리핑을 수행하고, 심의(협의)된 결과를 정리하여 본 설계에 적극 반영하여야 한다.

사. 적절한 설계와 효과적 사용을 통해 범죄유발 요인을 근본적으로 제거하는 셉테드(CPTED) 기법을 설계에 반영하여야 한다.

아. 건축 인허가, 설계협의회, 학교환경디자인팀 자문, 공사발주를 위한 관련 자료제출 등에 적극 협조하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 우리 청의 요구사항을 반영하여야 한다.

자. 우리 청에서 추진하는 감성적인 학교 공간 조성계획이 잘 반영될 수 있도록 협조하고 아이디어를 제공하여야 한다.

차. 건설기술진흥법 시행령 제 101조 2 제 1항의 가설구조물을 사용하는 건설공사(높이 5미터 이상 거푸집 및 동바리) 등 설계안전성 (DFS) 검토 대상일 경우 설계안전 검토보고서를 작성하여야 한다.

카. 건설기술 진흥법 시행령 제98조에 따른 안전관리계획서 작성 대상일 경우 관련 지침에 따라 시방서를 작성하여야 한다.

5. 용역기간

본 설계용역 기간은 착수일로부터 270일 이내로 한다.

(계획설계 30일, 중간설계 60일, 실시설계 90일, 각종 인허가 및 인증 90일)

☞ 본 설계용역 기간 중 설계협의 및 심의에 소요되는 30일에는 각종 설계협의회(설명회), 중간설계 심의 협의회 및 학교환경디자인팀 자문 기일 등을 포함한다.

6. 설계방향

가. 우리청에서 추진한 경상북도교육청 환경교육센터 구축사업 추진계획에서 제시하고 있는 기후위기□ 환경재난시대에 환경교육 활성화를 통한 사회적 실천체제

구축과 생태환경교육의 프로그램 개발 및 보급을 위한 연구를 함께 할 수 있는 환경교육의 거점공간으로의 계획과 외부공간에 대한 계획을 함께 수립한다.

나. 건축물은 안전을 최우선으로 하며, 환경체험교육이 효과적으로 이루어 질 수 있도록 설계되어야 한다.

다. 부지 공간구성 및 건축물의 형태는 주변 환경과 조화를 이루고 지역의 장소성을 고려한 계획을 제시하여야 한다.

라. 각 분야별 체험장의 특성화 된 공간 확보 및 공간별 연계성을 고려하며, 향후 운영의 효율성을 고려한 시설계획을 하여야 한다.

마. 향후 기능별 여건 변화에 따른 내부공간 및 외부공간의 융통성 고려한다.

바. 지역사회의 문화적 중심체로서의 역할을 분담할 수 있는 효율적이고 합리적인 기능의 배치와 창의력 넘치는 건물 조성한다.

사. 건물의 재료는 경제성, 내구성, 안전성 등을 고려하고 외장의 화려함(고비용)은 지양한다.

아. 지구환경문제와 새집증후군 등에 능동적으로 대처하고 예방할 수 있는 환경

친화적인 시설로 설계하여야 한다.(건축물의 장수명화, 친환경자재, 신·재생에너지, 고효율기자재 사용, 생태 면적률 적용 등)

자. 학생 및 교직원을 비롯하여 환경교육센터를 이용하는 모든 사람들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 시설로 설계하여야 한다.(엘리베이터, 옥외경사로, 난간, 장애인편의시설 및 기타 관계법령에 따라 설계반영)

차. 사업대상 건물의 해체시 지하층은 기존 과학원과 수학문화관, 사택동과 함께

운영되는 통합 기계・전기실로서 건축물 해체시 설비관련 적절한 정리와 이용에

대한 검토를 하여야 한다.

카. 공간 구성에 있어서 상충기능은 분리하고, 상호보환기능은 인접배치토록 계획되어야 한다.

타. 건축법, 도시계획법, 소방법 등 관련법규에 위배되지 않도록 계획한다.

파. 대상시설에 필요한 기능 확보를 위한 세부 설계계획 사항은 다음 참고자료를 활용하여 계획한다.

하. 계획설계 시 학교시설에 대한 기본계획 연구를 전문으로 하는 공공건축심의 의견서등의 자료를 분석하여 적극 반영한다.

구 분	참고자료	참고자료 기관	비 고
설계메뉴얼	실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기준	국토교통부 고시
설계메뉴얼	범죄예방 건축기준	국토교통부 고시
설계메뉴얼	학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행령-[별표1]	교육부
설계매뉴얼	장애물 없는 생활환경인증제도	한국장애인개발원
설계매뉴얼	학교시설 내진성능평가 및 보강매뉴얼	교육부

Ⅱ		일 반 사 항

1. 일반사항

가. 본 용역은 국토교통부 고시 제2020-635(2020.09.14)호의 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」에 의한 [별표 2] 건축설계에서의 도서작성 기준에 의거 추진단계별(계획·중간·실시설계) 중급 이상의 설계 도서를 작성하여야 한다.

나. 본 설계는 국토교통부 제정 각종 공사시방서, 건설공사 표준품셈과 본 설계지침에 의거 작성하여야 한다.

다. 모든 자재는 KS 제품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없는 자재는 국산 최우량품 또는 친환경인증자재를 사용하여야 한다.

라. 용역수행내용

1) 현황조사 및 지반조사

2) 계획 설계도서 작성 및 브리핑(각종 협의회 포함)

3) 중간 설계도서 작성 및 브리핑(각종 협의회 포함)

4) 실시 설계도서 작성

5) 조감도 작성

6) 주요자재 선정 검토서 작성

7) 색채계획서 작성 및 포함 사항

가) 색채디자인 기본방향 및 개념

나) 외부 입면 색채계획

다) 평면 색채계획

라) 공용 공간(홀, 복도 등 색채계획)

마) 각 실별 색채계획

바) 외부 공간(포장 등) 색채계획

사) 색상 명시 등

8) 미세먼지 저감 대책

9) 설계 설명서에 포함될 사항

가) 설계 주안점(테마, 스토리, 지역 및 전시공간 특성 등)

나) 설계 진행과정 일체

다) 조감도, 설계 개요, 대지 현황, 우수시설 사례조사, 법규 검토서

라) 건축계획, 구조계획, 토목계획, 조경계획

마) 기계설비계획, 전기·통신계획, 소방계획 등

바) 그 외 발주기관에서 요청하는 사항

10) 설계 설명서는 설계도서와 일치하여야 한다.

11) 기타 계약서 또는 과업지침서에 정하는 사항

2. 행정사항

가. 착수계 제출 시 다음의 제반 서류를 제출하여야 한다.

1) 착수계

2) 사업 책임기술자 선임계

- 재직증명서, 이력서, 기술자 면허수첩 사본, 경력증명서 첨부

3) 설계 예정공정표

- 분야별 세부공정 계획서 및 업무흐름도 포함

4) 분야별 참여기술자 명단

- 재직증명서, 이력서, 기술자면허수첩 사본, 경력증명서 첨부

5) 보안각서

6) 과업수행계획서

- 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

- 분야별(건축, 구조, 토목, 조경, 색채 등) 업무범위와 책임한계

- 설계품질 보증계획

- 각 분야별 인력투입계획

- 분야별 세부 과업수행 절차

- 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

나. 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 착수계 제출 후 우리 청과 협의하여 정기적인 업무협의회(월 2회 이상)를 실시하며, 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 하여야 한다.

가) 조사 및 자료 수집의 완료 또는 공법 결정 시

나) 계획설계 및 중간설계 완료 전

다) 실시설계 완료 전(유지관리 계획을 포함)

라) 각종 협의 및 설계심의 자료 작성 완료 시

2) 계약상대자는 매주 공정보고 및 매월 공정보고를 우리 청 담당자에게 제출하여야 한다.

가) 주간 공정보고【붙임 3】: 매주 수요일

나) 월간 공정보고【붙임 4】: 매월 마지막 주 수요일

☞ 제출방법: 우리 청 담당자 이메일로 제출

3) 설계 설명·협의회의 내용 반영 등 주요한 업무는 사전 승인을 받도록 하며, 과업수행은 예정공정표에 따라 성실히 수행하여야 한다.

다. 관련기관 인·허가 및 협조

1) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축허가에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 과업부지 내·외 지하지장물의 매설여부(상·하수도관, 기타)를 계약상대자 책임 하에 조사하고, 관련기관과 협의한 후 설계에 반영하되, 협의 결과를 우리 청에 보고하여야 한다.

3) 계약상대자는 본 과업의 인·허가 사항에 대하여 우리 청과 협의하여 가능한 용역기한 내에 건축승인 등 모든 행정절차를 완료할 수 있도록 노력하여야 한다.

라. 하도급의 범위

1) 계약상대자는 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 시험, 지반조사, 측량 등 이와 유사한 작업

나) 계획설계 연구와 관련된 업무

다) 적산 및 견적업무, 구조계산 설계업무

라) 기타 발주청이 인정하는 업무

3) 하도급은 관계법령에 의거 적격자에게 하도급 하여야 하며, 「건설기술진흥법」 제35조제4항 및 같은 법 시행규칙 제31조의 1항에 의거 설계용역의 하도급을 체결하였을 경우 하도급 기술참여자 명부를 작성하여 즉시 우리 청에 통보하여야 한다. 계약상대자는 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 져야한다.

마. 타 계약상대자와의 업무한계

다수의 계약 상대자가 공동계약 또는 별도 계약으로 일정 기간 내의 과업을 수행하여 서로간의 업무한계가 명확하지 못할 우려가 있는 경우, 대표자 책임 하에 계약상대자간의 업무 한계를 명확히 구분하여야 한다.

바. 과업의 변경 등

본 과업수행 중 우리 청의 사업계획 변경 등에 따라 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정·변경할 수 있다.

3. 유의사항

가. 계약상대자는 우리 청에서 제시하는 기본사항(제원, 위치, 계획, 개요 등)과 설계 유의사항을 충분히 숙지한 후 관련 자료를 수집하여 본 과업의 성과가 설계에 집약될 수 있도록 하여야 한다.

나. 계약상대자는 각 분야별 설계에 있어서 특수성 및 중요성이 요구되는 것은 그 원인을 분석하여 담당자와 협의 후 경제적이고 합리적인 안을 채택하여 설계하여야 한다.

다. 계약상대자는 계약서에 의거 기한 내 착수계 등 제반 서류를 제출하고 진행사항을 수시로 담당자에게 통보하여야 한다.

라. 계약상대자는 설계를 수행함에 있어 완료되거나 수정 설계 시에는 기계, 전기 용역 계약상대자 등과 수시로 협의하여야 한다.

마. 설계심의 및 보완 등

1) 계약상대자는 각종 설계와 관련된 설계심의회 및 설명회(협의회)에 참석하여 설명은 물론 심의자료를 작성하고, 보완요구 사항이 있는 경우는 즉시 보완조치 하여야 한다.

2) 제출된 설계도서는 우리 청이 관계 기관과의 협의를 거쳐 확정될 때까지의 지적사항과 공사시행 과정에서 설계변경(설계서의 내용이 공사현장과 상이, 누락·오류 또는 상호 모순 등) 상황이 발생되는 경우와 우리 청의 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 즉시 수정·보완하여야 한다.

바. 설계도서의 저작권

본 설계 건에 대하여는 계약상대자의 설계도서 납품 후 우리 청의 시설사업 추진이 목적이므로, 용역 납품 후 설계도서의 저작권은 우리 청에 귀속되며, 저작권과 관련한 제반사항은 저작권 법령에 따른다.

사. 책임 및 하자보증

1) 계약상대자는 일체의 제출도서에 대하여 책임을 져야 하고, 시공 도중 설계도서가 상호 부합되지 않을 경우 현지조사 및 시험 등의 요구가 있을 시 즉시 응하여야 하며, 이에 따른 발생 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

2) 용역납품 검수 후라도 설계상의 결함 또는 변경 사항은 반드시 수정요구에 응하여 보완 제출하여야 한다.

3) 제출된 설계도서에 대한 하자(공사시공 및 준공 후 설계구조의 불안전으로 발생하는 하자와 설계 후 공사물량의 착오로 인하여 손해가 있을 시 등)는 계약상대자로서의 성실의무와 필요한 조치를 이행하지 않으므로 인해 발생되는 상황이므로 이에 대한 모든 민·형사상의 책임을 져야한다.

아. 계약의 해제

용역계약 체결 후 과업진행 중 다음 경우에는 우리 청이 일방적으로 계약을 해지할 수 있으며, 계약상대자는 이의를 제기할 수 없다.

1) 계약서상의 설계도서 작성지침 및 계약 후 우리 청의 정당한 지시사항을 고의 또는 임의로 불이행 했을 경우

2) 계약상대자 개인의 특수사정, 무성의, 불성실 등으로 지정기일 내에 도저히 납품 가능성이 없다고 예상될 경우

3) 계약상대자의 고의 또는 부주의로 외부에 과업내용을 공개하여 우리 청의 사업 추진상의 물의를 야기 시켰을 경우

자. 우리 청의 사정으로 건축승인이 지연될 경우 별도 협의에 의하여 추후 건축승인을 완료하여야 한다.

Ⅲ		공 통 설 계 지 침

※ 본 사업은 당해 설계용역 건과 별개의 전시부분 설계‧제작‧설치가 병행되어야 하는바, 우리교육청 감독자 및 관련 T/F팀 주관하에 별도로 선정되는 전시부분 업체와 원활한 협의를 통하여 사업을 추진하도록 하여야 함.

1. 일반사항

가. 부지 내의 모든 시설에 관한 계획은 종합계획을 수립한 후 이에 따라 세부 실시계획이 작성되어야 한다.

나. 각 시설의 설계는 안전성, 경제성, 시공의 난이도 및 기능에서의 합리성이 검토되어야 하며, 가능한 조형미의 구현을 위한 노력이 집중되어야 한다.

다. 공사 집행계획에 소요되는 자재, 장비 및 노무 수급 등의 계획이 동시에 검토  되어야 하며, 합리적이고 구체적인 계획이 되도록 하여야 한다.

라. 작성된 각종 설계도서는 상호 그 내용이 합치되어야 하고 해석이 용이하도록 작성하여야 한다.(설계도서, 공사시방서, 각종 계산서 등)

마. 예정공정표는 PERT 또는 CPM 기법으로 작성하고, A3규격으로 제출하여야 한다.

2. 사전조사에 관한 사항

가. 정확한 기반조사

1) 부지입지 조건 및 지형조사

2) 기 조사된 지질·지반조사를 바탕으로 한 지내력보고서를 검토적용

3) 기존 철거 대상 건축물의 대한 조사[철거도면 작성]

나. 기상조건 조사

1) 일조 및 기온·습도

2) 풍향 및 풍속

3) 강우 및 강설량

다. 교통관계

1) 도로 및 교통량

2) 주차장

3) 중량적 운반수단 검토

라. 지하매설물 및 배수 계통의 조사(해당 시)

1) 지하매설물 유무 조사

2) 배수 및 오물처리 계통(해당 지역의 상·하수 시설 기본계획 포함)

마. 지역조건에 관한 조사

1) 지역의 위치, 형태 및 범위

2) 인근 시설물

3) 대지 내 기존 시설(장애물)의 유무

4) 토지이용계획에 관한 사항(도시계획상 용도지역 관계)

3. 건축물의 조형미 구현에 관한 사항

가. 건축물은 기능을 우선적으로 고려하되 미적으로 양호하여야 하며, 품질 확보를 위한 견실 설계로 부실공사를 예방할 수 있도록 최선의 노력이 집중되어야 한다.

나. 입면계획의 조형미

1) 균형과 통일성

2) 변화 있는 계획

다. 특수성을 살린 건축 계획

1) 기능에 따른 특징

2) 상징적 표현(Land Mark)

라. 마감 재료의 적정한 선택

1) 색채의 조화

2) 질감의 적정

3) 내구성이 있는 재료 선택

마. 주변 환경 여건과의 조화

1) 건축 계획의 조화성

2) 조경 계획의 적정화

4. 정지, 시설배치 및 조경계획 등에 관한 사항

가. 자연여건을 최대한 이용한 계획수립

1) 불필요한 절·성토의 지양

2) 옹벽 등 불필요한 구조물 설치의 억제

3) 수목, 암석 등 기존 조경재의 활용

나. 건물 및 주변 환경조건과 조화되는 조경계획 수립

1) 소재 선정 상 타당성 여부

2) 식재 밀도

3) 계절적 감각 검토

4) 토질 및 기후의 적용선 검토

다. 부지 내 각 시설의 합리적인 배치

1) 시설의 활용에 편리한 배치 계획

2) 일조 등을 고려하여 배치하고 건물 간 적정거리확보

3) 방화, 피난 등을 위한 공간 확보

5. 건물 계획에 관한 사항

가. 사용에 적정한 규모의 실 규격(모듈) 판단

1) 수용인원 판단

2) 수용장비의 크기, 용량, 대수판단

나. 사용 편리를 위한 건물 각부 치수결정(인체 및 사용기기, 설비 치수에 부합)

1) 출입구 크기의 적정화

2) 천장높이 및 창문높이 검토

3) 부대시설 크기 및 설치위치 검토(부속실, 기자재, 국기게양대 등)

4) 각부 치수의 표준화, 자재의 규격화

다. 이용에 합리적인 시설배치(각 실, 기자재 등)

1) 가급적 동선의 단축

2) 사용자가 편리한 동선 계획

3) 요구 기능에 따른 동선의 분리

4) 상·하층을 연결하는 수직 동선의 검토

라. 사용자가 편리하게 이용할 수 있는 후생시설 확보

1) 실내·외 휴게 공간 배려

2) 부지 주변의 휴게 공간 연계

마. 건물용도 및 규모에 적정한 내․외장 재료의 선택

1) 재료의 내구성(강도 등) 검토

2) 재료의 색상, 질감 및 사양 검토

3) 재료의 경제성 검토

바. 비상 시 대피시설의 확보

1) 피난시설(피난계단, 통로, 지하실, 비상구 및 옥외 공간)

2) 방화상 필요한 구조 및 재료의 선택

3) 오물 방지시설 계획 검토

사. 건물외관 계획에 관한 사항 검토

1) 건물 기능에 적합한 외관의 선택

2) 주변 환경과 조화되는 계획

3) 가급적 조형미의 구현

아. 사용에 적합한 통로시설 확보

1) 계단(계단의 위치, 폭, 단 너비 및 높이)

2) 복도 및 통로(복도 폭과 보행거리 검토)

자. 에너지 절약을 위한 건축 계획

1) 단열효과의 제고를 위하여 외벽, 바닥 및 천장의 구조 및 재료 검토

2) 가능한 자연채광과 환기를 고려한 적정면적의 창문설치

차. 창호설치 계획의 적정화

1) 실 기능에 맞는 창호재의 결정

2) 채광 및 환기를 위한 개구부 면적의 확보

3) 창호의 개폐방식, 방향, 크기의 적정화

4) 적정한 종류 및 크기, 창호 부속철물의 설치

5) 창호용 재료의 규격품 사용 명시

6) 창호의 개폐 시 밀폐될 수 있도록 정밀 설계

7) 창호의 재질은 단열, 결로 등을 방지 할 수 있는 기능성 창호로 설계한다.

6. 누수 및 결로 방지 대책에 관한 사항

가. 지하수압 적용에 관한 사항

1) 지하수 및 수압검토

2) 방수재료 및 공법의 적정성 검토

3) 지하수위를 낮추는 방안

4) 방수층을 통과하는 각종 배관주위 방수대책 강구

나. 우수 및 침수에 따른 대책

1) 지붕 및 외벽 부분에 대한 우수, 침수 대책검토(방수재료 및 공법선택)

2) 개구부 주위 누수방지 대책

3) 돌출부분 등 물끊기 처리

4) 화장실, 욕실 등 물 사용 실에 대한 방수대책

다. 결로 방지를 위한 검토

1) 외벽의 실내에 면한 부분의 구조 검토(노점온도 이상이 되도록 처리)

2) 열교현상 방지대책

7. 건축구조의 안전성에 관한 사항

가. 기존 내진설계에 변경이 되는 사항

나. 구조물에 사용하는 하중의 적정한 판정

1) 고정하중

2) 활하중

3) 풍압 및 적설하중

4) 수압, 토압, 기타

5) 내진설계: 지진대재대책법 제14조 규정에 따른 학교시설(학교시설 내진설계기준고시), 비구조요소는 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 및 「건축구조기준」에 따라 설계

다. 구조내력 상 필요한 내력벽의 설치 검토

1) 내력 상 필요한 벽량의 확보

2) 내력벽의 두께 및 길이

3) 내력벽의 구조 검토

라. 경제적이고 시공이 용이한 구조의 선택

1) 구조상 불필요한 부분의 소거 및 과대한 부재 단면의 축소 검토

2) 시공 및 구법이 용이한 구조 계획

3) 구조의 안전에 필요한 부재의 최소 단면 결정

마. 구조물의 신축에 대비한 신축줄눈 설치

1) 구조 연장이 긴 경우와 이질재간의 접합부, 기타 필요한 경우의 줄눈 설치

2) 설치 위치에 적합한 줄눈 종류 결정

8. 설계도면 작성에 관한 사항

가. 각종표기, 기호 및 방법은 관계 기준에 맞게 표기

나. 시공 및 적산이 가능토록 각종 상세도 작성

1) 각종 치수의 정확한 명기

2) 각종 사용자재의 명칭 기입

3) 각종 자재의 규격, 품질, 형태의 표시

4) 각종 설비계통의 명확한 표시

5) 조경자재의 수종, 규격, 위치 등을 정확히 표시

다. 설계도서 상 설계 책임자의 서명 또는 날인

9. 시방서 작성에 관한 사항

가. 시방서는 일반시방서와 특기시방서를 구분 작성한다.

나. 특기시방서는 일반시방서에 명시되지 않은 다음 사항을 포함 작성하여야 한다.

1) 재료의 규격, 품질, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 사항

2) 각종 자재의 설치방법(가공, 조립, 부착 등)에 관한 사항

3) 각종 가설물(가설, 건물, 울타리, 흙막이공법 등)에 관한 사항

4) 각종 구조공법(말뚝박기, 배근, 용접 등)에 관한 사항

5) 재료의 배합과 양생에 관한 사항

다. 공사시방서 내용은 본 공사에 해당되는 부분만 작성하여야 한다.

10. 현장인계에 관한 사항

설계도서를 납품한 후 우리 청 담당자에게 도근점, T.B.M 등을 인계하여야 한다.

Ⅳ		계 획 설 계 지 침

1. 계획 설계도서 작성

가. 설계방향

1) 우리 청에서 제시하는 과업내용과 각종자료를 분석하고 제반요소에 적합한 설계안을 제시하여 추후 중간 및 실시설계 용역을 수행할 시 기본이 되도록 하여야 한다.

2) 계획설계 진행과정을 우리 청과 수시로 협의하여야 한다.

3) 계획설계를 수행함에 있어서 건축법 및 기타 제반법규와 설계기준 및 과업지침서에 합당하여야 한다.

4) 계획설계 과정에 있어서 본 지침 및 일반 사항에 의하여 작성하되 미비 또는 의문사항이 있을 시 우리 청과 협의하여야 한다.

나. 관련법규 검토

- 건축구조기준, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

- 장애인·노인·임산부 등의 편의 증진에 관한 법률

- 공중화장실 등에 관한 법률

- 건축법

- 건설산업기본법

- 건설기술진흥법

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

- 도로법

- 하천법

- 폐기물관리법

- 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

- 주차장법

- 환경보건법

- 학교보건법

- 학교시설사업촉진법

- 고등학교 이하 각급학교 설립·운영 규정

- 학교 안전사고 예방 및 보상에 관한 법률

- 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

- 기타 학교시설물 신축과 관련된 법률 및 규정 준수

다. 부지 현황 조사

1) 학교 부지를 포함한 주변부지의 자연환경조사

가) 지형, 지세

나) 토질, 지반

다) 식생, 수리, 홍수

라) 조망, 시야의 조사

2) 인문 환경조사

가) 학생·교사·학부모의 요구, 사용규범, 행위·활동의 조사

나) 사회계층의 조사, 사회의 욕구조사

다) 조각, 회화, 음악적 특유성의 조사

라) 정치·경제적 시대성 조사 및 시대의 유행조사

3) 기반시설의 조사

가) 도로 및 차량 동선의 조사

나) 보행자 도로 및 보행 동선의 조사

다) 파출소, 병원, 우체국 등 학교와 연결되는 도시의 사회적 기반시설 조사

라) 상·하수, 오·폐수 등 학교와 연결되는 도시의 기술적 기반시설의 조사

마) 운동장 등 사용할 수 있는 주변 시설의 조사

라. 설계기준 및 여건분석

1) 사용자의 요구사항 적용

- 수학문화관(수학체험센터) 유사 사례조사 및 벤치마킹을 통한 분석

- 전시부분 설계·제작·설치 업체와 협업을 통한 사용자 요구 적극반영

2) 주변환경 분석

- 대상지역의 위치 및 세력권 분석

- 대상지역의 지형, 소음, 전망 등을 분석

- 동선의 분석

- 기존 대상 건축물 분석

4) 이용자동선 분석

- 체험시설 내에서 이용자 및 관리자의 동선 추적

- 환경체험센터와 수학문화관 동선 분리

- 이용자, 자동차 동선

- 보도 차도 공간분리

5) 에너지 절약 체험시설 조성

- 건물의 에너지 절약을 위한 전반적인 사항 제시

- 대지여건을 고려한 효율적인 에너지 이용방법 분석 등

8) 건강한 실내 환경 조성

- 환경기준에 적합한 건강하고 쾌적한 교육환경 조성 방안 고려

- 사용 자재 및 시공방법 등 실내 유해화학물질 발생 저감 방안 고려

- 자연채광, 환기, 통풍 등 배려

9) 기타

- 실내 및 옥외 공간의 무장애 공간계획

- 건물의 형태 및 동선 상의 무장애 계획

- 기타 관련법규 검토 등

마. 기본구상

1) 기본방향

- 실의 규모의 결정

- 동선의 흐름에 따른 실의 연관관계 결정

- 동선에 따르는 실의 위치설정

- 외부 체험시설 및 여가활동에 따르는 외부공간의 결정

- 인접 지역의 문화 컨텐츠와 연계된 체험시설 고려

- 지역사회 시설로서의 시설계획 등

- 전시실은 필요에 따라 중층고려 가능

(일부 슬라브 철거하여 2개층 사용 시 약 7m 층고 확보가능)

2) 기본 및 모듈의 설정

- 기존 건물의 기둥 사이의 모듈을 고려한 체험시설 고려(기본 모듈 A, B)

3) 토지이용(Zoning)

- 계획대상지 내에서의 외부공간의 형태 및 활용방식 제시

- 기존 경상북도교육청과학원, 추후 계획된 식당 및 기숙사동과의 연계 고려

4) 환경교육센터에 맞는 건물의 입면계획

- 기존 건물 배치를 충분히 활용한 3가지 기본구상(안) 제시

- 각 대안별 기본방향 및 기준에 견주어 평가 후 1개안 선정

5) 기본구상 협의

- 기본구상 및 연구 전반 협의

6) 건물의 배치

- 동선계획: 차량 주차 동선, 보행자 동선 표기

- 평면계획: 각 층별 평면도 작성 및 치수기입

- 입면계획: 4면 입면도 작성 및 주요 외장재 기입

바. 설계에 필요한 모든 자료를 조사, 수집하여 최소 3개안 이상의 설계안을 제안하고, 설계안에 대한 설계설명서를 작성하여 우리청[T/F팀]과 협의 후 결정한다.

2. 계획 설계도서 납품

가. 계획설계 연구보고서 5부.

나. 계획 설계도서 일체 5부.

다. 계획설계 설명회 자료 각 20부.

라. 가~다”까지 내용이 포함된 CD 1매.

☞ 위 “가~다”까지의 제출물은 사정에 따라 달라질 수 있음

Ⅴ		중 간 설 계 지 침

1. 중간 설계도서 작성

가. 설계방향

1) 계약상대자는 승인된 계획 설계안에 따라 다음과 같이 중간설계를 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 우리 청이 승인하기 위하여 요구하는 합리적인 중간 설계안을 준비하여 제출(지역·지구에 따른 건축법규 분석과 추정 공사비 산출 포함)하여야 한다.

3) 외벽, 지붕, 구조, 실의 배치, 방향, 지형 등에 대한 여러 가지 대안들을 제공해야 한다.

4) 설계 요구 조건을 만족하여야 한다.

나. 과업 내용

1) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 파악

나) 사전 조사에 의한 각종 조사 자료의 수집

다) 관련시설의 사전조사와 수요자 요구사항 조사 및 협의

라) 유사 사례 및 관계법령 조사

마) 각종 설계협의

바) 관련 기관과의 협의

2) 조건 설정

가) 설계 조건의 설정

- 요구 성능 확인

- 법령 및 기타 제약 조건의 정리

- 안전 성능의 설정

- 공사 예산의 파악

나) 설계 방침의 설정

- 설계 개념의 확립

- 개략 공사시방서의 설정

- 사용 재료 및 기기 등의 설정

다) 비교 및 검토

- 성능 면에서의 기능 검토

- 설계 이념·의장 및 구조 형식 등의 검토

- 공사비 및 시공성 검토, 사용기기, 재료 등 검토

- 유지관리상의 검토

- 시방, 구조 방식 등의 종합적 검토

- 지하 매설물 이설 및 보강공법 비교 검토

라) 종합화

- 기능 배치 계획의 선정

- 공간 구성 계획의 선정

- 공사비 배분 계획의 선정

- 동선 계획의 선정

- 방재 계획의 선정

- 시설 배치 계획의 선정

- 평면, 입면, 단면 계획의 선정

- 구조 계획의 선정

- 내·외 환경 계획의 선정

- 조경 계획의 선정

- 수요자의 요구사항 종합 및 선정

- 토사운용계획, 굴착계획(흙막이 가시설 및 계측 포함), 포장계획, 상·하수도 계획

2. 중간 설계도서 납품

가. 중간 설계도서 일체 5부.

나. 중간설계 심의회 자료 각 20부.

다. 색채계획서 자료 각 8부.

라. 중간설계 설명회 자료 각 5부.

마. 가~라”까지 내용이 포함된 CD 1매.

☞ 위 “가~라”까지의 제출물은 사정에 따라 달라질 수 있음

Ⅵ		실 시 설 계 지 침

1. 실시 설계도서 작성

가. 설계방향

1) 계약상대자는 승인된 중간설계안을 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 실시설계를 수행하여야 한다.

2) 당해 시설물의 유지관리에 필요한 부대시설을 설계에 포함시켜야 하며, 당해 시설물의 유지관리에 필요한 비용·인력·장비 등 유지관리방법을 제시하여야 한다.

3) 굴착이 수반되는 경우에는 굴착 시 지하 매설물 및 대상지 주변의 안전 관리에 관한 사항이 충분히 검토·반영되도록 하여야 한다.

4) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍·혹서·혹한 등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 산정하여야 한다.

5) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 공사시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 우리 청이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

나. 과업 내용

1) 실시설계 전후 건설기술진흥법에 따른 “설계의 안전성 검토”에 따른 자료제공 및 검토사항을 반영한다

2) 정보 수집 및 준비

가) 설정되는 조건의 상세한 파악 (조건의 파악)

나) 현지 상세 조사 및 확인

다) 관련시설 상세조사와 수요자의 요구사항 확인

라) 사용 재료 및 기기 등에 관한 조사 및 확인

마) 특수 공법 부분의 상세 조사

바) 각종 법령 수속에 대한 협의

3) 조건 설정

가) 기본설계에 의한 설계 조건의 상세한 설정

- 각 부분의 요구 성능의 확인

- 법령, 기타 제약 조건의 각 부분 파악

- 각종 하중 조건 및 해석 수법 설정

- 각 설비의 요구 성능의 확인

나) 공사비의 파악

다) 기본설계에 의한 설계 방침의 전개

4) 비교·검토

가) 각 부분 기능의 검토

나) 공간 표현의 검토(형태의 검토 및 사용 재료의 검토)

다) 공사비 및 시공기술의 검토

라) 각종 설비 방식의 검토 및 유지관리에 관한 검토

마) 사용기기 및 사용 재료의 검토

바) 관계법령 등의 조합 및 검토

5) 종합화

가) 외부 및 내부공간 설계

나) 각 부분 사용 재료 및 시방의 설정

다) 평면, 단면, 입면 및 상세설계

라) 공사비 예산과의 조정

마) 방재 설계, 응력 해석 및 구조 설계

바) 색채 계획의 수립

사) 신․재생에너지 이용설비 계획의 검토 조정

아) 사용 재료, 사용기기 및 사양 결정

자) 수요자의 요구사항 결정

차) 각종 설계 등의 조정

다. 재료선정 기준

각종 재료의 선택은 시설물별 특성을 고려하여 내구성, 내마모성, 색상·질감·무늬 등이 적합한 재료를 선택하되 다음사항에 유의하여야 한다.

1) 경제성을 고려할 것

2) 색채의 조화 및 통일성을 기할 것

3) 내구성 있는 재료를 선택할 것

4) 유지보수가 용이한 재료를 선택할 것

5) 질감의 적정성을 기할 것

라. 각부 재료

1) 외벽재료

외부색채와 질감 및 미관을 고려하여 재료를 선정하여야 한다.

2) 내부바닥

경제성, 소음 발생, 위생관리, 유지관리상 적정한 제품으로 선정하여야 한다.

3) 내벽재료

각 실의 용도 및 특성을 고려하여 경제성 있는 재료를 선정하여야 한다.

4) 천정재료

실의 기능에 따라 흡음성을 고려하여 선정하여야 한다.

5) 창호재료

에너지효율등급 성능을 만족하는 자재로 검토하되 경제성, 단열성 등을 고려하여 선정하여야 한다.

6) 방수 및 단열재료

내구성, 시공성, 경제성 등을 고려하여 선정하여야 한다.

2. 실시 설계도서 납품

Ⅻ. 설계도서 작성 및 납품(2-다. 최종성과품 종류 및 납품수량) 참조

Ⅶ		건축공사 설계지침

1. 부지활용 계획

가. 계획부지는 기존 생활관동과 주변 외부공간의 일부를 철거 후 환경교육센터가

입지할 사업부지와 주변 외부공간 일부이다.

나. 계획부지의 고·저차는 현장여건 및 주변상황 등을 감안하여 정한다.

다. 부지가 효율적으로 활용되도록 녹지공간, 휴게공간, 주차장 등을 적정하게 계획하되, 향후 변화에 대응할 수 있도록 종합적(Master Plan)으로 계획하여야 한다.

2. 배치계획

가. 현장조사 내용을 면밀히 검토하고 부지여건 및 기존건물 배치 등을 고려하여,

관계법규 제반규정에 적합하게 계획한다.

나. 진입로와 주변여건, 도시계획 현황을 감안하여 계획한다.

다. 기존 건물의 통풍 및 배수를 최대한 고려하여 계획한다.

라. 시설관리와 전시□체험동선, 체험자와 관람자 동선, 옥내와 옥외 체험동선 등 각각의 동선을 면밀히 분석하여 시설 운영 및 이용 동선에 가장 적합한 방안을 제시하여야 한다

마. 주변 교통 현황을 고려하여 혼란을 최소화할 수 있는 차량 진·출입 동선을 계획하고 보행자 동선을 우선적으로 고려한다.

바. 주차대수는 관계법을 준수하되 주차 수요를 고려하여 여유 있게 계획한다.

사. 기존 수학문화관과의 연결증축을 고려하여 계획한다.

3. 평면계획

가. 각 전시□체험 공간의 용도와 기능에 따라 수평, 수직으로 조닝(zoning)하며, 체험의 특성(동적체험, 정적체험)에 따라 분리/배치하여 평면을 계획한다.

나. 교육의 연속성이 요구될 시 건물 내부와 외부의 공간이 서로 연속성을 확보하도록 계획한다.

다. 각 전시□체험 공간의 형태는 향후 시설 운영의 환경변화에 유연하게 대처할 수 있게 용도변경, 칸막이의 변경, 증축 등을 용이하게 할 수 있도록 계획한다.

라. 공용공간은 효율적인 구성으로 유지·관리가 용이하도록 계획하면서, 각종 프로그램과 연계되어 다양하고 생동감 있는 공간을 연속적으로 느낄 수 있는 창의적인 계획을 한다.

마. 환경교육센터는 다수의 학생들의 교육활동이 이루어지는 시설이므로 쾌적하고 충분한 공간이 확보되도록 한다.

바. 계단, 엘리베이터, 화장실, 물품보관소 등 코어계획은 동선 및 효율적 이용 등을 감안하여 계획한다.

사. 장애인 등을 위한 접근로 및 편의시설 등은 관련법에 의하여 계획하되 시설

이용에 불편이 없도록 최대한 배려한다.

4. 입면계획

가. 환경교육센터에 부합하는 독창성 및 인지성, 전시, 체험시설로서의 상징성 등을

제시할 수 있도록 구조물의 매스(Mass), 입면 형태 및 색상 등을 계획한다.

나. 전체적으로 안정감 있는 규모계획으로 주변 건물과의 조화 및 균형미를 고려해

계획한다.

다. 외부마감재는 내구성,내오염성이 강하고, 유지관리가 용이한 재료로 계획한다.

라. 환경교육센터라는 목적에 맞게 태양광 및 지열 에너지 활용, 빗물저장소를

활용한 조경수 활용 등 환경생태교육을 할 수 있는 건축 및 시설물을 설치하여

운영할 수 있는 계획을 한다. (예)BIPV시스템, 야생조류 충돌방지스티커 등)

마. 각종 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하고, 열손실 및 소음 등의 영향이

최소화 되도록 냉난방부하 저감을 위한 차양 등의 일사 차폐시설을 계획한다.

5. 단면계획

가. 기존 사업부지의 대지 레벨 차이에 대한 이해와 검토를 통해 건축물 내부 진입 레벨을 적절히 계획한다.

나. 층별 층고 계획시 수학문화관 2층과 환경교육센터 1층과의 연결성 및 접근성을 고려해 계획한다.

다. 내부 층고는 실의 기능 및 면적에 따라 최적의 높이가 되도록 계획하고

세부시설별 특성과 필요한 설비배관 등을 고려하여 기능적이고 합리적인

단면계획이 되도록 계획한다. (전시물의 높이 등을 고려)

라. 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 상호 연관성을 가질 수 있도록 수직

동선을 원활하게 계획한다.

마. 적절한 Core계획을 통한 동선의 단축 등 공용면적의 중복을 최소화할 것

6. 기타

1) 디지털 기반의 스마트형 학습을 대응하기 위해 교지 어디서든 접근이 가능한 유‧무선 네트워크망 구축을 계획한다.

2) 공간의 변형에 맞춰 학습형태, 모둠의 규모에 따라 자유롭게 배치가 가능하도록 공간을 계획한다.

3) 가능한 체험학생들의 외부활동공간과 중첩되지 않는 범위 내에서 주차공간이 추가 확보될 수 있는 방안을 검토하여 계획에 반영한다.

4) 안전한 학교환경 조성을 위해 ⌜교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률⌟에 따른 안전인증제도 및 범죄 예방 설계(CPTED)인증제도, 장애물없는 생활환경인증제도(BF) 등의 인증기준에 적합하도록 계획한다.

5) 전문가의 컨설팅을 받아 체험교육활동을 안정적으로 수행할 수 있도록 한다.

Ⅷ		토목공사 설계지침

1. 현황조사

계약상대자는 설계 착수 전 부지에 대한 현황, 경계, 지적 등을 종합 검토하여 기초자료를 수집하고 설계에 반영하여야 한다.

2. 부지조성

가. 부지정지는 홍수 시에도 자연배수가 가능하도록 한다

나. 토공계획은 가능한 한 절토, 성토비율을 1:1로 설계토록 하고 부득이한 경우 토사유입 및 반출은 합당한 장소를 선정하여 설계한다.

다. 현지여건에 따라 필요시 축대(옹벽 등) 및 비탈면 보호공을 설치토록 한다.

3. 담장

가. 주위환경 및 미관지구의 특성으로 고려한 울타리 또는 담장 등으로 계획한다.

4. 배수

가. 하수시설 단면은 유량계산에 의거 결정하고, 유량계산 강우강도는 해당지역 20년에 1회 빈도의 강우강도를 사용하여야 한다.

나. 분뇨하수 및 생활하수와 우수처리는 분리배수를 원칙으로 하여 인근 기반시설 실정에 맞도록 계획하여야 한다.

다. 운동장(주차장) 표면수 처리를 위하여 적정한 구배를 주어야 한다

라. 각종배수시설은 제반 법규를 충분히 검토하여 경제적이고 영구적인 시설이 되도록 한다.

5. 교문

가. 정문 형태를 주위 환경과 체험시설로서의 이미지등을 고려하여 설계한다.

나. 정문의 폭은 대형차량(버스, 소방차량 등)이 원활히 진입할 수 있도록 설계하여야 한다.

라. 정문 상부에 조형물을 설치할 시 높이는 소방차량 통행(소방 관계법) 및 준공 후 각종 공사용 건설장비 통행에 지장이 없어야 한다.

6. 포장

가. 포장재료는 콘크리트, 칼라콘크리트, 아스콘, 인조화강석블럭, 고무블럭, 점토블럭, 잔디블럭 등 현지 실정에 부합되도록 충분한 자료를 분석·수집 후 결정하여야 한다.

나. 경계석은 시중 기성제품(콘크리트, 화강석) 사용을 원칙으로 한다.

다. 포장 재료는 보·차도용으로 구분하여 적절히 적용하여야 한다.

Ⅸ		조경공사 설계지침

1.  일반사항

가. 설계목적

이용자들에게 휴식·운동 및 놀이를 즐길 수 있는 옥외활동 장소를 마련해 주고 지역적, 문화적 특성 및 주변 환경의 정서 등을 고려하여 학교의 특성에 맞는 아름다운 녹지 및 시설 경관을 조성하여 건강하고 쾌적하게 학습할 수 있는 학교 교육환경을 조성한다.

나. 설계범위

1) 조경계획은 관련법규 및 기준에 적합하고 친환경 건축물 인증이 가능토록 하여야 하며, 아울러 관목 및 교목의 비율은 적정하게 고려하여야 한다.

2) 건축 및 토목계획에 의거 설계의 합리성, 구조물의 안정성, 설치시설의 적정성 등에 관한 사항을 분석하여 식재 및 조경시설물을 확정하여야 한다.

3) 공종별 계획을 근거로 실시설계 이전에 공종별 세부설계 기준안을 작성하여야 한다.

4) 각 평면계획의 일반적인 현황(위치, 면적, 현 상태 등)이 도입시설의 적정성, 주제의 이미지 형성 정도를 분석하고 이에 관련된 사항들이 논리적 기술적으로 타당성이 인정될 수 있어야 한다.

5) 주변 환경 및 입지여건을 분석하여 주위와 조화되게 배치하여야 한다.

6) 각종 자재는 경제적이고 내구성이 있는 재료로 할 것이며, 목적물 외의 이미지 형상에 적합한 것으로 채택하여야 한다.

다. 설계 시행 방법

1) 부지의 특성과 배경을 기본으로 한 설계방향을 설정하고 기술적, 경제적 타당성이 검토되어야 하며, 환경 보호와 이용이 합리적으로 계획될 수 있도록 공간개념을 설정하고 이를 토대로 적정한 기능이 부여되도록 계획되어야 한다.

2) 보존가치가 있는 수목이나 식물은 이식 될 수 있도록 설계에 미리 반영하여야 한다.

3) 조경대상지는 주변의 생태환경을 고려하고, 절·성토 사면은 자연환경 훼손을 최소화 하며, 환경 친화적인 방법으로 복구·복원방안을 수립하여야 한다.

4) 생태학습의 장(생태 정원 등)으로 활용되는 공간은 친환경 건축물인증에 적합한 규모로 조성하고 학생들의 자연학습, 체육, 여가, 휴식 등의 공간으로 활용할 수 있도록 계획하여야 한다.

5) 소음이 예상되는 부분에는 밀식 수림대를 조성하고, 조경시설물에는 파고라, 벤치, 앉음벽 등의 휴게시설과 생태연못, 산책로 등을 계획하고 녹화구역과 조화롭게 계획되어야 한다.

6) 보행로, 광장, 휴게시설 등의 포장구간은 일정한 문양을 넣어 각 공간별 특성을 살리도록 하며, 토목분야의 포장설계와 상호 연계하여야 한다.

7) 옥상녹화 계획 시는 건물구조에 지장이 없도록 구조보강 또는 경량토를 사용하고, 학생들의 안전을 고려하여 파라펫 난간 상부에 별도의 난간을 계획한다.

8) 조경시설은 기성품과 현장 제작품에 대해 경제성과 시공 난이도 등을 비교 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

Ⅹ		설계도서의 작성 및 납품

1. 설계도서 작성

■ 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2016-1025호) 별표(설계도서 작성방법)에 따른 단계별(계획·중간·실시설계) 설계도서를 작성하여야 한다.

가. 설계 설명서

1) 공통분야: 공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 내용 및 공정, 총공사비 산출 및 산출근거 등을 작성하여야 한다.

2) 건축분야: 기본계획, 환경 및 대지조건, 배치계획, 법규 검토, 주요 사용재료 결정, 평면·입면·주요 단면 선정, 구조·부대시설 등 기본방식 결정, 친환경 설계내용, 방재계획, 주차계획, 동선계획, 전시 동선계획, 에너지절약 계획, 건축 구조계획, 공정계획 및 세부 공사비 등

3) 토목분야: 토질조사, 가시설 공법 검토, 주요 공법 및 주요재료 선정, 골재원 및 사토장 선정, 배수처리계획(공사중 계획 포함), 신기술·신공법 선정에 관한 사항, 공정계획, 공사비 산정 등 추가

4) 조경분야: 토양조사 결과, 배수, 식재 및 시설물 계획, 세부공정계획, 세부공사비, 유지관리계획 계획 등

5) 설계 설명서에 포함될 사항

가) 설계 주안점(테마, 스토리, 지역 및 학교 특성 등)

나) 설계 진행과정 일체

다) 조감도, 설계 개요, 대지 현황, 우수시설 사례조사, 법규 검토서

라) 건축계획, 구조계획, 토목계획, 조경계획

마) 기계설비계획, 전기·통신계획, 소방계획 등

바) 그 외 발주기관에서 요청하는 사항

나. 각종계산서 등

1) 각종 구조계산서, 지질조사보고서, 수리계산서, 에너지 절약계획서 등 포함

2) 물량산출서

- 수량산출은 타인이 알 수 있도록 객관적으로 표현하여야 하며, 각 공정별로 집계표를 작성하여야 한다.

- 공정별로 산출된 물량이 누락 또는 과다 산출되었는지를 알 수 있도록 세부 산출내용에 대한 체크리스트를 작성하여 물량산출서 앞에 첨부하여 제출하여야 한다.

다. 설계도면

1) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성하여야 하며, 설계도서 상호간 모순·오기·누락·불분명성·외래어 표기 등이 없어야 한다.

2) 설계도면은 한글(필요시 부분적으로 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용하여 작성하여야 한다.

3) 모든 설계도면에는 도면작성자, 검토자, 책임기술자가 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인하여야 한다.

4) 설계도면에는 주석(Note) 란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및 강도, 주요설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록하여야 한다.

5) 설계도면에는 관련 도면 란을 만들어 해당도면과 주요 관련 있는 도면들의 번호 및 도면 명을 표기하여야 한다.

6) 설계도면 작성은 AUTO CAD 2012 소프트웨어와 상호 호환되는 제품을 사용하여 우리 청 컴퓨터와 완벽하게 상호 호환되도록 조치하여야 한다.

7) 설계도면 파일은 출력도면 외에 CD로 제출하여야 하며, 각 파일은 개별 열람 및 수정이 가능하도록 조치(파일압축 불가)하고, 도면 Font 및 Plot style 파일을 함께 저장하여 제출하여야 한다.(파일색인 목록 CD표지에 부착)

라. 주요자재 선정 검토서 작성

1) 주요자재(시멘트, 철근, 레미콘 등)는 도급자 관급자재로 명기하여야 한다.

2) 주요자재에 대하여 상세히 비교·분석(특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품, 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 및 기능성, 안전성, 기밀성, 친환경성 등)한 자료를 서면으로 제출하여야 한다.

마. 공사시방서

1) 공사시방서는 국토교통부 건설공사표준시방서를 기준으로 작성하여야 하며, 공사시방서를 작성할 경우는 자재·공사여건 등을 고려하여 당해 공사조건에 적합하게 시방서 내용을 수정·보완 또는 선택하여 시방서를 작성하여야 한다.

2) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

- 적용범위, 용어의 정의, 설계도서 적용의 우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세 사항

- 해당 건설공사 표준공사시방서 및 전문공사시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

- 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

- 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세 사항

- 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 작성기준 등 필요한 사항

- 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기, 절차 등에 관한 세부사항

- 우리 청과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

- 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차․방법․시기

- 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세 사항

- 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용 장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

- 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

- 기타 주요공사 사항

3) 공사시방서 작성 시 유의사항

- 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 한다.

- 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성하여야 한다.

- 표준양식을 사용하도록 하고, 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

- 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성하여야 한다.

- 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성하여야 한다.

- 사용자재는 자재선정위원회에서 선정되는 등 특별한 경우를 제외하고는 제조회사의 고유제품명을 표기할 수 없으며 학술적 명칭 또는 일반적인 용어를 사용하여야 한다.

- 설계여건 상 신기술·신공법·특허공법·특허기술을 채택하여야 할 경우에는 동 기술이나 공법을 적용해야하는 사유(타당성, 비교 검토서 포함)을 제시한 후 우리 청에서 주관하는 공정성 있는 자재선정위원회를 통하여 결정하여야 한다.

바. 공사내역서

1) 공사내역서 작성은 국토교통부 제정 건설공사표준품셈을 기준으로 하되 우리 청과 협의하여 적용하여야 하며, 내역서 파일은 조달청 및 우리 청에서 요구하는 파일로 제출하여야 한다.

2) 공사내역서는“지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준”에 의하여 산출하되, 아래 기준을 참고하여 산출한다.

가) 재료비

- 조달청장이 조사하여 통보한 가격(시장시공단가)으로 한다.

- 조달청장이 조사한 가격에 없는 자재는 기획재정부에 등록한 전문가격조사기관에서 조사·공표한 2가지 이상의 물가지 가격 중에서 최적가격을 적용 하여야 하며, 단가조사서를 작성하여 제출하여야 한다.

- 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 유효한 2 이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 최적가격을 적용하여야 한다.

나) 직접노무비: 대한건설협회에서 공표한 시중 노임을 적용하여야 한다.

다) 일정규모 이상 공사에서 사용하는 자재는 발주자가 직접구매(관급)토록 관련사항을 설계도서에 표기하여야 한다.(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조)

라) 공사용 자재를 관급으로 구매해야 할 경우에는 관급자재의 범위 및 품목을 우리 청과 미리 협의하여 선정하고, 직접구매(관급구매) 할 수 없는 사유가 있는 경우에는 입찰공고 시 그 사유를 공표하도록 관련 설계도서에 표기하여야 한다.(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조)

※ 직접구매 대상 자재는 공개경쟁입찰을 위한 특기시방서 및 물품규격서를 작성하여 제출하여야 한다.

3) 필요한 경우 공사비에 지장물 이설비, 에너지 인입 공사비 및 정밀안전진단비, 시운전비, 실내 공기질 측정비, 기타시험비, 친환경인증비, 기존 건물 철거비, 폐기물처리비(100톤이상 시 별도 작성) 등을 포함하여 내역서에 반영하여야 한다.

4) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고, 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서에 그 근거를 기록하여야 한다.

5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

6) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

7) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

8) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

9) 운반비는 목적지, 운반 장비, 운반거리, 도로상태(속도 등), 목적지까지의 이동 경로 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

사. 예정공정표 작성

예정공정표는 PERT 또는 CPM 기법으로 작성하고, A3 규격으로 축소하여 제출하여야 한다.

아. 지장물 조서 및 인·허가 도서

1) 지장물 조서 작성

- 지장물은 우리 청과 협의하여 그 범위 등을 조사하여 결정하여야 한다.

- 사업시행으로 인해 훼손되는 지장수목의 현황을 조사(이식, 벌채 구분)하여 기재하여야 한다.

2) 인·허가 도서 작성

- 관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가용 도서를 작성한다.

자. 기타

1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

2) 모든 보고서, 계산서, 공사시방서, 지침 등은 A4 크기 용지에 작성하는 것을 원칙으로 한다. 다만 규격을 달리할 경우 우리 청과 사전협의하여야 한다.

2. 설계도서 납품

가. 추진단계별 설계도서의 납품은 시기는 다음과 같이 구분한다.

1) 계획설계: 착수일로부터 40일 이내

2) 중간설계: 착수일로부터 120일 이내

3) 실시설계 최종납품: 착수일로부터 270일 이내

나. 최종성과품 제출은 예비검사 등 모든 검토, 협의, 승인 등이 완료된 후 과업수행 종료일 전에 납품하여야 한다.

다. 최종 성과품의 종류 및 납품수량

구 분	규 격	납품수량	비고
1. 설계도면(공종별 구분)	A1출력, A2책철	3 부
	A3출력, A4책철	8 부
	A4출력, 좌편철	3 부
2. 설계원도(공종별 구분)	A3출력	1 부	보관바인더 포함
3. 건축축조승인서 (관련 서류 포함)	A4출력	2 부
4. 설계CD 및 USB (내역서, 산출서 포함)	·설계도서 일체 ·설계도면 일체	2 개 1 개
5. 공사시방서	A4	8 부
6. 설계내역서	A4	3 부
7. 산출기초	A4	3 부
8. 일위대가표	A4	3 부
9. 서약서	A4, 참여기술자 전원	2 부	서명날인
10. 용역 참여기술자 명단	A4, 참여기술자 전원	2 부	서명날인
11. 구조계산서(구조확인서)	A4	8 부
12. 설계설명서	A4	5 부
13. 조감도	60cm × 90cm	2 식	액자포함
	조감도 사진 8×10'	10 매	액자 5매포함
14. 색채 계획서(도면 포함)	A4 책철	5 부
	A3 좌편철	3 부
	A4 색채계획 설명서	5 부
	설계CD	2 개
15. 신기술적용 검토조서	A4	3 부	해당 시
16. 공사 예정공정표	네트워크식	5 부	감독1,감리1,증빙1, 현장1,사무실1
17. 지반조사 검토보고서	A4,	8 부	해당 시
18. 기타 용역수행 관련자료	담당공무원의 요구자료	3 부	해당 시 작성 제출

※ 납품 시 제출도서는 공사의 특성 및 종류에 따라 변경될 수 있음

【붙임 1】 실별 소요 면적

구분	세부시실	사용규모	면적(㎡)	비율(%)	비 고
전시𐩐체험 영역	로비/전시공간1	1영역	150		2개층 복층구조
	로비/전시공간2	1영역	150		2개층 복층구조
	전시실1~4	1영역	450		4개의 소영역 구분
	테마전시실	1영역	150		구획되지 않은 공간
	해양체험센터	1영역	200		독립된 실로 구성
	소계		1,100	38.94%
교육𐩐연구 영역	대강의실	1실 x 150㎡	150		유연한 실구성
	환경실험실(메이커실)	1실 x 75㎡	75		다목적실과 근접
	다목적실1	1실 x 60㎡	60		수업공간
	다목적실2	1실 x 60㎡	60		수업공간
	소계		345	12.21%
업무𐩐관리 영역	센터장실	1실 x 30㎡	30		사무실과 인접
	사무실	1실 x 60㎡	60		회의실 포함
	강사대기실	1실 x 30㎡	30		해설사 5명
	수장고	2실 x 60㎡	120		지하1층 설치
	준비실	1실 x 60㎡	60		1층 설치
	안내데스크/관리실	1실 x 30㎡	30		2층 설치
	소계		330	11.68%
휴게영역	북카페	1실 x 75㎡	75		독서/휴게/공연 등
	휴게공간	1실 x 30㎡	30		방문객 이용
	옥상정원	3층 외부	-		옥상 텃밭, 휴게
	소계		105	3.72%
공용공간	방풍실	2실 x 15㎡	30		1,2층 2곳
	화장실(남,여,장애인)	각층 x 45㎡	135		각층에 남녀분리
	계단실, E/V실, 복도	각층	690		E/V실 지하운행
	연결통로	1층	30		수학문화관 연결
	소계		885	31.33%
지하	기계실/전기실	1실 x 60㎡	60	2.12%
합 계			2,825	100%

※ 기존 생활관동 연면적(2,690.49㎡)의 ±5% 범위 내에서 가정한 제시(예시)안으로

설계자 의도에 따라 세부시설의 면적 조정, 변경 가능.

【붙임 2】 부지 현황

【붙임 3】

주간 공정보고
□ 용 역 명: 계약명 기재 □ 용역개요 ○ 용역기간: 20 . . . ~ 20 . . . ○ 계약금액: 000,000,000원 □ 용역진행사항
구 분	전주 진행사항(20 . . .)	금주 진행사항(20 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업 진행현황 등 - 주요 협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 기재 - 건축, 토목 등 분야별로 구분되도록 작성		(실시/예정공정)실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기
주 소: 상 호: 대 표 자: 책임기술자: (인) 경상북도교육청 귀하

【붙임 4】

월간 공정보고
□ 용 역 명: 계약명 기재 □ 용역개요 ○ 용역기간: 20 . . . ~ 20 . . . ○ 계약금액: 000,000,000원 □ 용역진행사항
구 분	월간 업무수행 내용(20 . . .~ 20 . . .)	비고(진행률)
첫째주		(실시/예정공정) %로 기재
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
기 타	- 공정 지연시: 지연의 구체적 사유 기재
주 소: 상 호: 대 표 자: 책임기술자: (인) 경상북도교육청 귀하

[서식 1]

착 수 신 고 서

감독관 경유          (인)

1. 용   역  명 :

2. 계 약 금 액 : 금 0원(금 원)

3. 계약 연월일 : 20  .  .  .

4. 착수 연월일 : 20  .  .  .

5. 완료 연월일 : 20  .  .  .

6. 첨 부 서 류 : 착공서류 각 1부.

상기와 같이 착수하였기에 착수신고서를 제출합니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경상북도교육청 귀하

[서식 2]

책임기술자 선임계

1. 용   역  명 :

2. 계 약 금 액 :

3. 계 약 일 자 : 20  .   .   .

4. 착 수 일 자 : 20  .   .   .

5. 완료 예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경상북도교육청 귀하

[서식 3]

설  계  예  정  공  정  표

가. 공사개요

1. 용 역 명 : 2. 현 장 위 치 : 3. 용 역 기 간 : 20 . . .~20 . . . (착수일로 부터 00 일)	계 약 자 4. 상 호 : 5. 대 표 자 : (인)

나. 주요공정예정표

일 정 공 정	20 년도
	20 . . .~20 . . . (착수일로 부터 180일)
	5					10						15						20						25						30						35						40						45						50						55																																						180
1. 착수 및 현장조사
2. 계획설계
3. 중간설계
4. 실시설계
4. 납품

※ 참고 : 가능토록 상세히 기재

[서식 4]

설계용역 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연번	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급
1	건축	계획설계	‘20. . . ~’20. . .	00	OOO	건축사보	예시

※ 참고 : 가능토록 상세히 기재

[서식 5]

각 분야별 인력투입 계획서

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

연번	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	투입기간/일수(예정)		성 명	직위(급)
1	건축	기본설계	‘20. . .~’20. . .	00	OOO	건축사보	예시

※ 참고 : 가능토록 상세히 기재

[서식 6]

완 료 신 고 서

감독관 경유          (인)

1. 용   역  명 :

2. 계 약 금 액 : 금 0원(금 원)

3. 계약 연월일 : 20  .  .  .

4. 착수 연월일 : 20  .  .  .

5. 완료 연월일 : 20  .  .  .

6. 납품 연월일 : 20  .  .  .

7. 첨 부 서 류 : 납품서류 각 1부.

상기와 같이 완료하였기에 납품신고서를 제출합니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경상북도교육청 귀하

[서식 7]

납 품 확 인 서

감독관 경유          (인)

1. 용   역  명 :

구 분	규 격	요구수량	납품수량	비고
1. 설계도면	A3출력, A4책철	4 부
	A4출력, 좌편철	2 부
2. USB포트용 플랫쉬메모리	설계도서 일체	2 SET
3. 공사시방서(표준, 특기)	A4	3 부
4. 설계내역서(설계도면에 포함 가능)	A4	3 부
5. 설계내역서(일위대가, 산출기초 포함)	A4	2 부
6. 서약서	A4, 참여기술자 전원	2 부
7. 용역 참여기술자 명단	A4, 참여기술자 전원	2 부
8. 구조계산서(구조확인서)	A4	3 부
9. 신기술적용 검토조서	A4	3 부
10. 지반조사 검토보고서	A4	5 부
11. 기타 용역수행 관련자료	담당공무원 요구자료 등	각 1부

* 성과품의 종류 및 납품부수(해당없는 경우 부분적으로 제외할 수 있음)

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경상북도교육청 귀하

[서식 8]

서 약 서 감독관 경유 (인) 1. 용 역 명 : 2. 계약 연월일 : 20 . . . 3. 착수 연월일 : 20 . . . 4. 완료 연월일 : 20 . . . 5. 납품 연월일 : 20 . . .
	본인은 20 년 00월 00일부터 20 년 00월 00일까지 상기용역을 체결함에 있어 본 도면으로부터 알게 된 모든 내용 및 유사한 내용이라도 용역시행 이외에는 일체 누설치 않을 것이며, 이후에라도 이에 대한 보안을 엄수 할 것이며, 또한 추후 설계도면 및 내역서상의 오류 또는 기타 시공 상 문제가 있을 시에는 재설계 및 관계 법규에 따라 모든 책임을 질 것을 서약합니다.
20 . . . 계 약 자 주 소 : 상 호 : 대 표 자 : (인) 경상북도교육청 귀하