설계용역과업지침서

【저동초등학교 공간재구조화사업 설계용역】

2025.  10.

	울릉교육지원청
	(행정지원과)

과업지침서

1. 총칙

가. 과업의 명칭

저동초등학교 공간재구조화사업 설계용역

나. 과업의 목적

본 설계 과업지시서는 경상북도울릉교육지원청에서 시행하는 「 저동초등학교 공간재구조화사업」를 설계함에 있어 각 분야별로 적정한 설계지침을 설계자에게 제시함으로써 경제적이고 안전하며 편리한 학교 건축물의 기능을 발휘할 수 있도록 설계 성과품의 품질 향상을 목적으로 한다.

다. 과업 개요

1) 설계개요: 저동초등학교 이전 3,223.3㎡ (±5%이내 조정가능), 지상3층 규모

* 전기, 통신, 설비, 소방 별도발주

2) 예정사업비(건축공사비): 9,248,107천원(토목, 조경, 부대공사, 부가세포함)

* 본 공사에 대한 예정공사비이며, 이에 따른 공종간 금액을 배분하여 예정 공사비 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

3) 과업수행기간

용역의 과업 기간은 착수일로부터 [ 240 ]일간으로 한다. (국, 공휴일 포함)

가) 사전조사 및 기본설계(계획): 착수일로부터 [ 60 ]일이내

나) 중간설계: 착수일로부터 [ 120 ]일이내

다) 실시설계: 착수일로부터 [ 240 ]일이내

라. 과업 내용(해당사항 적용)

1) 본 용역은 국토교통부 고시 제2020-635(2020.09.14)호의 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」에 의한 [별표 2] 건축설계에서의 도서작성 기준에 의거 추진단계별(계획·중간·실시설계) 중급 이상의 설계 도서를 작성하여야 한다.

2) 본 용역 계약상대자는 계획설계, 중간설계 및 실시설계를 수행하여야 하며, 설계범위는 건축, 토목, 조경 분야를 포함한다.

3) 본 공사 준공 이후 건축행정시스템(세움터) 건축물관리대장 등재 업무를 수행하여야 한다.

4) 에너지 절약계획서 : 녹색건축물 조성 지원법 제14조(에너지 절약계획서 제출)에 의해 공공건물 74점 이상으로 설계하고 증빙 받아야 한다.

5) 녹색건축 예비인증: 녹색건축(일반 이상) 예비인증을 득하여야 한다.

6) 제로에너지건축물 예비인증: 에너지 절약계획서 제출 대상으로 제로에너지 예비인증을득하여야 한다.

7) 지반 지질조사: NX 1공, BX 1공

- 감독관에게 조사계획을 제출 후 대지의 현황 및 지반조사를 실시하여 설계에 반영하고, 조사를 위한 장비 진입 및 제반 인·허가 등은 계약상대자 책임 하에 이행하여야 하며, 이에 따른 민원이 발생하지 않도록 처리하여야 한다.

8) 경상북도울릉교육지원청(이하 “우리 청”이라 한다)의 계획설계 설명회, 중간설계 심의 협의회 및 사용자 측(지역민포함) 설계 설명회 등 모든 협의회의 관련서류 작성과 브리핑을 수행하고, 심의(협의)된 결과를 정리하여 본 설계에 적극 반영하여야 한다.

10) 적절한 설계와 효과적 사용을 통해 범죄유발 요인을 근본적으로 제거하는 셉테드(CPTED) 기법을 설계에 반영하여야 한다.

11) 건축 인허가, 설계협의회, 학교환경디자인팀 자문, 공사발주를 위한 관련 자료제출 등에 적극 협조하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 우리 청의 요구사항을 반영하여야 한다.

12) 우리 청에서 추진하는 감성적인 학교 공간 조성계획에 따른 관련 내용이 잘 반영될 수 있도록 협조하고 아이디어를 제공하여야 한다.

13) 저동초등학교의 실정에 맞게 교사를 개축하여 교육의 내실화를 도모하고, 창의적이고 미래지향적이며 현대화된 교사를 구축하여 쾌적하고 편리한 시설로 설계한다.

14) 본관 교사동과 유기적으로 연계될 수 있도록 배치계획을 수립하여 설계한다.

15) 급식차량 및 학생들의 통학동선을 고려하여 보차 분리 계획안을 마련한다.

16) 식당의 경우 급‧퇴식 동선 구분하여 수요자인 학생들의 혼란을 방지할 수 있도록 구성한다.

17) 조리실의 경우 조리종사원 및 식자재 동선을 고려한 효율적인 평면 공간 구성을 한다.

18) 저동초 및 우리 청과 협의하여 공간기획 시 학교 특화교육(중점교육)을 설계에 반영할 수 있도록 한다.

19) 내부공간에서 외부를 조망할 수 있도록 시각적으로 개방된 형태로 구성한다

20) 학교가 위치한 지리적 특성상 차량 및 보행자 동선 구분이 어려워 설계 시 이를 고려한다.

21) 부지가 협소하여 휴게공간 조성이 어려울 수 있어 옥상이나 필로티 등을 활용한 공간조성을 고려한다.

22) 별도 증축되는 다목적강당과 개축될 교사동이 유기적으로 연계될 수 있도록 설계한다.

23) 철거공사가 설계에 포함될 경우, 해체신고나 해채허가 건에 해당되므로 이에 따른 해체계획서를 작성하여 납품하여야 한다.

마. 일반사항

1) 착수신고서 및 기타 제출서류

가) 계약상대자는 착수계 제출 시 다음 제반 서류를 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

◉ 사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허 수첩 사본 첨부)

◉ 예정 공정표

◉ 각 분야별 용역비 산출내역서(준공 시 정산을 위함)

◉ 과업수행계획서(아래참조)

- 관련분야별(건축, 토목, 조경, 기계, 색채 등) 업무범위와 책임한계

- 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표

- 각 분야별 인력투입계획

- 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

(2) 보안각서

나) 계약상대자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 한다.

(1) 용역 기성부분 검사원

(2) 납품 기한 연기원 및 검사원

(3) 학교장 의견서(요구서)

(4) 하도급 통지 등 기타 용역 수행에 필요한 사항

(5) 설계·감리 등 용역손해배상보험 가입공제증서를 용역 완료 전까지 제출하여야 한다.

2) 업무협의 및 공정보고

가) 계약상대자는 착수신고서 제출 후 발주청과 협의하여 정기적인 업무협의회를 실시하며, 다음과 같은 경우에는 반드시 업무협의를 한다.

(1) 계획설계 완료 시

(2) 중간설계 완료 시

(3) 실시설계 완료 시(최종 설계 결정 및 공사비(내역) 산정을 위함)

3) 관련기관 인․허가 및 협조

가) 계약상대자는 본 과업과 관련하여 관련기관의 건축허가에 필요한 서류를 작성하여 제출하여야 한다.

나) 계약상대자는 본 과업수행 중 구조물 등의 계획 및 설계시는 발주청과 협의 한다.

다) 계약상대자는 과업부지 내․외 지하지장물의 매설여부(도시가스관, 상․하수도관, 기타) 및 도시가스 공급가능여부, 전기․전화 공급지점 등을 계약상대자 책임하에 관련기관과 협의한 후 설계에 반영하여야 하며, 협의 결과를 발주기관에 보고하여야 한다.

라) 계약상대자는 동 사업 인․허가사항에 대하여 발주청과 협의하여 가능한 용역기한 내에 건축승인 등 모든 행정절차를 완료하여야 한다.

4) 과업의 변경 등

본 과업수행 중 발주자의 사업계획 변경 등에 따라 변경사항이 발생될 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하고 정산처리하거나 과업의 범위를 조정․변경할 수 있다.

가) 과업수행 중 사용 문서는 한글로 작성하고 사용 언어는 한국어로 하며, 업무상 사용하는 통역 및 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

나) 사용 문서는 한글(버전 2018 이하)로 작성하며, 변경이 필요한 경우는 사전 발주청의 승인을 받는다.

6) 기타

가) 기본설계, 중간설계 실시설계 업무는 진행 전 사전승인을 받도록 하며, 과업수행은 예정공정표에 따라 성실히 수행하되, 발주청에 제출한 과업수행계획서에 따른다.

2. 일반지침

가. 공통사항

1) 적용 요령

가) 용역 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

나) 본 과업지시서에서 제시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 발주청과 협의하여 정한다.

다) 본 과업지시서에 대한 대안은 제시될 수 있으며 이에 따른 객관성있는 자료를 제출, 발주청의 승인을 얻은 후 채택될 수 있다.

라) 설계도면 및 시방서에 특정 제품을 사용할 수 없으며, 부득이한 경우 발주청에서 운영하는 자재선정위원회 등의 승인을 받은 후 설계에 반영할 수 있다.

마) 각종 계산 기준은 외국 기준을 적용할 수 있으나, 발주청과 협의하여야 한다.

2) 발주청과 계약상대자의 책임 및 업무

가) 설계 목표와 추진 절차

(1) 계약상대자는 건축과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계 용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

(2) 계약상대자는 용역 착수 시 발주청이 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 한다.

(3) 계약상대자는 발주청 승인없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

(4) 설계는 관련법규와 계약조건, 발주청과 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행 과정에서 변경 요인이 발생했을 경우 계약상대자는 발주청에게 보고할 책임이 있으며, 관계법규 및 계약서 검토, 발주청과의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 모색하여야 한다.

(5) 계약상대자는 설계 용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약 조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대하여 즉시 발주청에 알려야 한다.

(6) 계약상대자는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 조경 등 각 공종별로 긴밀히 협조하여 설계내용이 서로 달라 문제점이 발생하지 않도록 해야한다.

(7) 계약상대자는 용역 종료 후라도 공사 진행과정에서 설계하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주청이 이에 대한 보완자료 및 변경도서를 요구하였을 경우 계약상대자는 자신의 비용으로 지체없이 이를 이행하여야 한다.

나) 인․허가 및 승인(필요시)

용역 착수 시 인․허가 및 승인이 요구되는 목록을 작성한 후 발주청에 제출함으로써 업무 범위를 명확히 하고, 필요한 경우 발주청의 협조를 받아 필요한 도서를 작성함과 동시에 인․허가(협의)를 받을 수 있도록 성실히 노력하여야 한다.

다) 회의

(1) 계약상대자&발주청이 필요하다고 판단되어 실시하는 회의 개최 시에는 계약상대자가 회의록을 반드시 작성하고 보관하여야 한다.

(2) 회의록 작성 시에는 날짜, 장소, 참석자, 안건, 결론, 질문 등을 포함 작성한다.

라) 보안

(1) 업무 내용의 비공개: 계약상대자는 발주청과 업무 수행 중 알게된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주청의 승인없이 공개해서는 안 된다.

(2) 검토 및 협의 창구 단일화: 계약상대자와 발주청의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 협의 창구는 단일화하여 보안 유지가 용이하도록 하여야 한다.

마) 과업변경(발주청 승인에 의한 업무내용 변경 시 계약변경)

(1) 발주청은 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 계약상대자는 발주청의 승인이 없는 한 계약서를 위반할 수 없다.

(2) 업무 내용 변경은 발주청과 설계자가 문서화를 통하여 상호 승인을 하여야 하고, 이는 계약변경의 근거 서류가 된다.

(3) 계약서 및 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주청&계약상대자 상호 간 협의로 결정하기로 하며, 만약 업무 내용의 변경이 발생할 때는 “(6) 추가 용역”에 의한다.

(4) 기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정은「지방자치단체 용역계약일반조건] 규정에 따른다.

바) 추가 용역

계약상대자는 계약에 의한 용역과 별도로 발주청과 협의되어 불가피하게 추가키로 한 용역 외 수행업무에 대하여는 추가 용역비를 청구할 수 있다.

(1) 추가 용역에 대한 범위, 대가 및 방법은 계약서에 의함.

(2) 추가 용역에 대하여는 사전에 발주청과 협의하여 결정하되, 발주청이 승인하지 않은 사항은 대가를 지급하지 않는다.

사) 기존 시설의 처리(대지조성 포함)

(1) 계약상대자는 부지 등에 기존 구조물이 있어 공사 내용의 변경, 추가 등이 예상될 때 이에 대한 상세한 조사를 해야 한다.

(2) 발주청 또는 계약상대자가 관련기관과 협의로 제공되는 모든 기존 구조물의 자료에 대해 검토한 후 매설된 구조물이 있을 경우, 충분한 조사를 통해 위치 등을 명백히 해야 한다.

나. 조사 및 자료수집

1) 현장조사+

가) 계약상대자는 현장을 조사하여 설계 공법(자재 등 설치 사양) 등 적합 여부와 공사로 인하여 간섭되는 주변 시설물 등의 지장 여부를 확인하여야 한다.

나) 건물의 상태, 학사일정, 학교현황, 주변조건 등을 상세히 파악하여, 작업장 등의 확보가능 여부를 판단하여야 한다.

다) 현장조사 시 반드시 주변 및 기존 시설물의 균열 등을 사진(또는 동영상)을 찍어 USB 등에 정리하고 민원 발생 시 참조 한다.

2) 지장(매설)물 조사

가) 각종 매설(배관, 배선 등)물 및 지장물에 대한 현장 및 자료를 정확히 조사하여 설계에 반영한다.

나) 매설(지장)물 중 이설이 필요한 경우 설계에 반영하고, 타 공공기관 등에서 관리하는 시설인 경우 해당기관과 협의한 후 반영한다.

다) 조사된 매설(지장)물은 현황도에 정확히 표기되어 있어야 한다.(기본설계에 포함)

3) 표토 및 지장수목조사(필요시)

가) 식재지반조성을 위한 표토를 미리 조경기술자와 협의하여 표토의 수집과 보관을 위한 계획을 한다.

나) 사업부지내의 기존수목의 현황을 조사하여 활용계획을 수립한다.

다) 기존수목을 현 상태로의 보전이 불가능한 경우 기준에 따라 이식을 계획한다.

라) 지장수목은 가급적 이식을 원칙으로 하되, 조경적 가치와 경제성 등을 종합 고려하여 이식이 적합하지 않을 경우 벌채 처리한다.

4) 배수시설 조사(필요시)

가) 자료수집 항목 : 강우강도, 강우시간(지속시간) 및 강우빈도

5) 구조물 조사(필요시)

가) 계획 대지 부근의 기존 건물 및 각종 구조물 현황과 문화재 현황을 조사한다.

나) 각종 구조물 및 문화재가 계획 대지에 인접하여 있을 경우 문화재 위치 등에 대한 상세한 사항을 현장 조사 및 관련자료를 확보하여 조치계획을 발주청과 협의한다.

6) 지반조사 수행

가) 시추조사(Boring Test)

- 시추조사 시 표준관입시험을 병행 실시한다.

- 시추기는 유압식 소형착정기를 사용한다.

- 시추공 직경은 BX(Φ60mm), NX(Φ76mm)로 한다.

- 굴진용수는 청수를 사용한다.

나) 표준관입시험(S.P.T)

- 시추작업과 병행하여 각 토층의 지내력 및 토층의 구성상태 파악을 위하여 한국공업규격(KS F 2318)에 의거 N치를 측정한다.

- 조사 깊이는 N치 50이상 또는 기반암층까지 실시한다.

- 조사간격은 1.5m마다 또는 지층이 변할 때마다 실시함을 원칙으로 한다.

다) 시료채취 및 물성시험

- 시료채취는 기초의 설계와 시공에 필요한 지반정보를 확보하기 위하여 자연상태의 시료와 교란된 시료로 구분된다.

- 물리적․역학적 특성을 파악하여 설계정수를 결정하기 위하여 실내 토질시험(함수비, 비중, 액․소성한계시험, 입도시험)을 수행하여야 한다.

라) 지하수위 측정

- 각 시추공에서 지하수위를 측정하여 기록한다.

- 시추작업 종료 후 케이싱 내에서 1차 측정을 실시하고 24시간 경과 후 재 측정하여 안정된 지하수위를 측정하여야 한다.

마) 하향식탄성파탐사(D.H.T)

- 시추공을 이용한 암반의 P,S파 속도 산출 및 파쇄대 위치 파악 및 지층별 탄성파 속도를 측정하여 지층분포 현황을 파악한다.

바) 지반조사 결과 정리

- 시추조사로 회수한 토질시료나 코어 관찰 결과, 굴진과정 중 특이사항, 지하수 분포 상태를 종합하여 시추 주상도를 작성한다.

- 시추 주상도는 지반상태를 분석하고 설계를 실시하는데 근간이 되는 자료이므로 조사과정에서 얻은 모든 결과를 분명하고 정확하게 기재하여야 한다.

사)  기초형식 선정에 대한 검토

- 지반조사결과를 토대로 지반구성과 각 지층의 개략적 상황을 검토하여야 한다.

- 지하수위 평가 및 주변자연과 지반재해의 흔적 및 재해발생의 위험성 등을 충분히 고려하여 건물의 규모, 기능, 구조와 기초 지지층을 판단 후 기초형식 및 지정을 선정하여야 한다.

아) 지반조사는 우리 청 담당자 입회하에 작업을 수행 하여야 한다.

7) 기타 조사사항

본 공사에 따라 주변 시설에 미치는 문제, 민원 문제 등을 조사 검토한다.

다. 계획 및 중간설계

설계자는 조사 및 자료수집단계에서 발주청에 제출․승인된 자료에 의하여 다음과 같이 기본계획을 수행한다.

1) 용역내용

가) 계약상대자는 상세한 사업범위를 규정하기 위하여 가능한 합리적으로 많은 검토를 하여야 하며, 추정 공사비에 대한 검토와 계약조건에 따라 추가적인 업무를 수행할 수 있다.

나) 사업의 명확한 범위에 대하여 발주청 승인을 득한 후 계약상대자는 요구되는 수량의 도서와 추정(개략) 공사비를 제출하여야 한다.

다) 계획의 내용은 다음과 같다.

(1) 설계대상이 되는 건축물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적 조건을 확정하기 위해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등의 업무

◉ 각종 법령상의 제약조건

◉ 건축물의 배치 계획상의 조건

◉ 현장조사 및 기존 조건 및 상태에 대한 기본도면

◉ 개략적인 설계안(평면, 입면, 단면)

◉ 발주자요구서(반영여부, 상호 필요에 의함)

◉  재료(마감재) 계획

◉ 각종(오수, 우수, 배수, 급수 등) 계통도(필요시)

◉ 기타사항

(2) 설계대상이 되는 건축물의 개략 설계에 따른 공사비의 추산

라) 계획 및 중간설계 각 단계별 설계도서내용 “공공발주사업에 대한 건축사용역의 범위와 대가 기준 『국토교통부고시 제2020-635호(2020.9.14.)]』”에 맞게 작성하여야 하며 단계별 발주청의 승인을 받은 후 다음 단계로 진행하여 함.(사업별 종류에 따른 협의 조정 가능함)

2) 관련법규 검토

◎ 건축구조기준, 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙

◎ 장애인·노인·임산부 등의 편의 증진에 관한 법률

◎ 공중화장실 등에 관한 법률

◎ 건축법

◎ 건설산업기본법

◎ 건설기술진흥법

◎ 시설물의 안전관리에 관한 특별법

◎ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

◎ 도로법

◎ 하천법

◎ 폐기물관리법

◎ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률

◎ 주차장법

◎ 환경보건법

◎ 학교보건법

◎ 학교시설사업촉진법

◎ 고등학교 이하 각급학교 설립·운영 규정

◎ 주택건설기준 등에 관한 규정

◎ 학교 안전사고 예방 및 보상에 관한 법률

◎ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

◎ 제로에너지건축물 인증에 관한 규칙

◎ 기타 학교시설물 증축과 관련된 법률 및 규정 준수

라. 실시설계

계약상대자는 계획 및 중간설계를 바탕으로 다음 각 호의 사항을 고려하여 실시설계를 하여야 한다.

1) 용역내용

가) 공사기간 부족으로 부실공사가 발생하는 사례가 없도록 태풍․혹서․혹한 등 작업 불능 일수를 감안하여 적정한 공사기간을 부여하여야 한다.

나) 설계도서는 충분하고 상세한 도면, 시방서, 구조 계산서, 공사비 내역서, 발주청이 승인하는 공사 공정표와 입찰을 위해 필요한 모든 자료를 포함한다.

다) 도면과 시방서는 조건을 충족시키기 위해 필요한 정보를 포함하고 주어진 범위와 입찰자들이 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방을 포함하여야 하며, 건설공사의 의도와 목적을 달성하는데 필요한 준비를 갖출 수 있도록 한다.

라) 계약상대자는 설계내역서에 포함되어있는 견적 금액에 대한 견적서를 포함시켜야 하며, 발주청의 사정변경으로 예산의 범위에 맞추어야 할 필요가 있을 경우는 계약상대자가 설계도서를 수정하여야 한다.

마) 실시의 내용은 다음과 같다.

(1) 공사 계약에 필요로 하는 시방서, 설계도면, 내역서(입찰자가 건설공사의 완벽한 수행을 위한 수량, 품질과 노무, 자재량 산출에 충분한 시방서를 포함한다.) 및 관련서류의  최종 납품 등의 업무

◉ 시방서(해당 공정에 대한 표준 및 특기시방서)

◉ 각 종정별 세부 설계내역서(일위대가, 견적서, 산출서)

◉ 공사 예정 공정표

◉ 각종 인허가 서류

◉ 구조계산서 또는 구조검토서

(2) 기타 필요로 하는 서류(1.5 성과품의 납품 참조)

바) 실시 단계 설계도서내용 “공공발주사업에 대한 건축사용역의 범위와 대가 기준 『국토교통부고시 제2020-635호(2020.9.14.)]』”에 따르며 아래와 같다.(사업별 종류에 따른 협의 조정 가능함)

3. 성과품 작성 및 납품

가. 일반사항

계약상대자는 성과품 작성에 있어서 시공상의 의문이나 문제점이 없도록 최선을 다하여 작성하되 다음 사항은 그 정하는 바에 따른다.

1) 예비검사

계약상대자는 납품 전 설계용역 납품목록 및 최종 성과품에 대한 원고 1부씩을 제출하여 예비검사를 받아야 하며, 수정이 필요한 부분은 협의하여 수정하여야 한다.

2) 설계도서 작성기준

설계도서 작성은 건축사법 및 건축물의 설계도서 작성기준에 따라 작성한다.

3) 계약상대자는 모든 설계도서의 성과품 인쇄 및 제본은 발주청과 협의 후 실시한다.

나. 성과품의 납품

1) 성과품 납품시기

가) 최종성과품 제출은 예비검사 등 모든 검토, 협의 등이 완료된 후 과업수행 종료일 전에 납품하여야 한다.

2) 성과품의 종류 및 납품부수(해당없을시 협의 후 조정할 수 있음)

구 분	규 격	납품수량	비고
1. 설계도면(공사예정공정표포함)	A3출력, A4책철	4 부	감독1, 학교1, 현장1, 감리1
	A4출력, 좌편철	2 부	증빙1, 보관1
2. USB포트용 플랫쉬메모리(CD)	설계도서 일체	2 SET	감독1, 보관1
3. 공사시방서(표준, 특기)	A4	4 부	감독1, 증빙1, 현장1, 감리1
4. 설계내역서 (일위대가, 산출기초 제외)	A4	2 부	감독1, 감리1
5. 설계내역서 (일위대가, 산출기초 포함)	A4	3 부	감독1, 증빙1, 보관1 견적서, 단가적용표 포함
6. 서약서	A4, 참여기술자 전원	2 부	서명날인
7. 용역 참여기술자 명단	A4, 참여기술자 전원	2 부	서명날인
8. 구조계산서(구조확인서)	A4	5 부	증빙1, 보관2, 현장1, 감리1
9. 조감도	조감도		설계도면과 포함 제본
10. 신기술적용 검토조서(해당시)	A4	3 부	증빙1, 증빙2
11. 색채디자인 계획	A3책철	4 부	감독1,증빙1,감리1,현장1
12. 준공도서	세움터로 입력 사용승인내역, 현황도면	2 부	공사준공시 제출
13. 기타 용역수행 관련자료	현장조사 및 지장물 등 사진첩	1 SET	완료시 일괄 제출
	추가 용역(과업) 증빙자료	3 부	증빙1, 보관2
	담당공무원의 요구자료	3 부	해당 시 작성 제출
※ 설계 용역자는 과업준공 시 상기와 같이 성과품을 납품하되, 이와별도로 설계도서와 함께 모든 과업 성과품은 전자저장매체(USB 및 CD 등 충분한 용량확보) 1개에 일괄 저장하여 아래기준에 의거 제출하여야 한다. ㅇ 설계도면은 도면목록화일 및 한글폰트화일, 플롯 스타일(plot style)이 포함되어야 한다. ㅇ 내역서(일위대가표, 단가산출서 포함)는 발주청과 조달청이 요구하는 파일로 제출한다.

4. 업무서식

첨부 1. [서식1] 착수신고서

2. [서식2] 책임기술자 선임계

3. [서식3] 설계예정공정표

4. [서식4] 설계용역 참여기술자 명단

5. [서식5] 각 분야별 인력투입 계획서

6. [서식6] 완료신고서

7. [서식7] 납품확인서

8. [서식8] 서약서  끝.

[서식1]

착 수 신 고 서

감독관 경유          (인)

1. 용   역  명 :

2. 계 약 금 액 : 금 0원(금 원)

3. 계약 연월일 : 20  .  .  .

4. 착수 연월일 : 20  .  .  .

5. 완료 연월일 : 20  .  .  .

6. 첨 부 서 류 : 착공서류 각 1부.

상기와 같이 착수하였기에 착수신고서를 제출합니다.

20 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경상북도○○교육지원청교육장 귀하

[서식2]

책임기술자 선임계

1. 용   역  명 :

2. 계 약 금 액 :

3. 계 약 일 자 : 20  .   .   .

4. 착 수 일 자 : 20  .   .   .

5. 완료 예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경상북도○○교육지원청교육장 귀하

[서식3]

설  계  예  정  공  정  표

가. 공사개요

1. 용 역 명 : 2. 현 장 위 치 : 3. 용 역 기 간 : 20 . . .~20 . . . (착수일로 부터 00 일)	계 약 자 4. 상 호 : 5. 대 표 자 : (인)

나. 주요공정예정표

일 정 공 정	20 년도
	20 . . .~20 . . . (착수일로 부터 150 일)
	5					10						15						20						25						30						35						40						45						50						55																																						150
1. 착수 및 현장조사
2. 기본설계
3. 중간설계
4. 실시설계
4. 납품

※ 참고 : 가능토록 상세히 기재

[서식4]

설계용역 참여기술자 명단

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

ㅇ용 역 명 :

ㅇ용역기간 :

ㅇ도 급 자(회사명 및 대표자 명기) :

ㅇ용역참여자(총괄․분야별 책임 및 참여기술자)

연번	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격종목 및 등급
1	건축	기본설계	‘20. . . ~’20. . .	00	OOO	건축사보	예시

※ 참고 : 가능토록 상세히 기재

[서식5]

각 분야별 인력투입 계획서

(수행계획서, 종합보고서에 첨부)

연번	분야별	설계참여기술자					비고
		참여세부 과업내용	투입기간/일수(예정)		성 명	직위(급)
1	건축	기본설계	‘20. . .~’20. . .	00	OOO	건축사보	예시

※ 참고 : 가능토록 상세히 기재

[서식6]

완 료 신 고 서

감독관 경유          (인)

1. 용   역  명 :

2. 계 약 금 액 : 금 0원(금 원)

3. 계약 연월일 : 20  .  .  .

4. 착수 연월일 : 20  .  .  .

5. 완료 연월일 : 20  .  .  .

6. 납품 연월일 : 20  .  .  .

7. 첨 부 서 류 : 납품서류 각 1부.

상기와 같이 완료하였기에 납품신고서를 제출합니다.

20 .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경상북도○○교육지원청교육장 귀하

[서식7]

납 품 확 인 서

감독관 경유          (인)

1. 용   역  명 :

구 분	규 격	요구수량	납품수량	비고
1. 설계도면	A3출력, A4책철	4 부
	A4출력, 좌편철	2 부
2. USB포트용 플랫쉬메모리	설계도서 일체	2 SET
3. 공사시방서(표준, 특기)	A4	4 부
4. 설계내역서(일위대가, 산출기초 제외)	A4	2 부
5. 설계내역서(일위대가, 산출기초 포함)	A4	3 부
6. 서약서	A4, 참여기술자 전원	2 부
7. 용역 참여기술자 명단	A4, 참여기술자 전원	2 부
8. 구조계산서(구조확인서)	A4	3 부
9. 조감도		각 2매
10. 신기술적용 검토조서	A4	3 부
11. 색채디자인 계획		5 부
12. 지반조사 검토보고서	A4	5 부
13. 준공도서		2 부
14. 기타 용역수행 관련자료	담당공무원 요구자료 등	각 1부

* 성과품의 종류 및 납품부수(해당없는 경우 부분적으로 제외할 수 있음)

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

경상북도○○교육지원청교육장 귀하

[서식8]

서 약 서 감독관 경유 (인) 1. 용 역 명 : 2. 계약 연월일 : 20 . . . 3. 착수 연월일 : 20 . . . 4. 완료 연월일 : 20 . . . 5. 납품 연월일 : 20 . . .
	본인은 2000년 00월 00일부터 2000년 00월 00일까지 상기용역을 체결함에 있어 본 도면으로부터 알게 된 모든 내용 및 유사한 내용이라도 용역시행 이외에는 일체 누설치 않을 것이며, 이후에라도 이에 대한 보안을 엄수 할 것이며, 또한 추후 설계도면 및 내역서상의 오류 또는 기타 시공 상 문제가 있을 시에는 재설계 및 관계 법규에 따라 모든 책임을 질 것을 서약합니다.
20 . . . 계 약 자 주 소 : 상 호 : 대 표 자 : (인) 경상북도○○교육지원청교육장 귀하